제215회 전주시의회 제1차 정례회

도  시 건 설 위 원 회

2004년도

주요업무 추진상황 보고

도 시 관 리 국

	보 고 순 서

ꏅ  일    반    현    황    ━━━   2

ꏅ  2004년도 시 책 방 향    ━━━  10

ꏅ  2004년도 주요업무계획   ━━━  11

○  도     시     과       ─────   12

○  주 택 행 정 과       ─────   18

○  도     로     과       ─────   26

○  교     통     과       ─────   41

○  하     수     과       ─────   49

○  도시발전기획단       ─────   59

○  환 경 사 업 소       ─────   64

○  차량등록사업소       ─────   69

일  반  현  황

ꏅ 기구 ꠚꠚ  5과  1단  2사업소  33팀(현원 186명)

															도 시 관 리 국
	도 시 과														주 택 행 정 과																도 로 과
도시관리			도시계획				도시정비			지적				주택행정			공동주택			일반건축			지역개발			재개발				도로행정			도로기획			도로건설			도로보수			교통시설

	교 통 과																하 수 과										도시발전기획단
주차장관리			교통지도			대중교통			교통운영			경전철				치수			시설			재난방재				용지보상			사단이전				기반조성			신시가지

	환경사업소														차량등록사업소
관리			하수처리				위생처리			실험				관리			등록			검사

ꏅ 인력                                                 ( 2004. 6월현재)

과 별		총 계	일 반 직						별정	기능	청경
			4급	5급	6급	7급	8급	9급
계	정 원	187	1	8	33	45	36	7	1	52	4
	현 원	186		9	35	57	29	1	1	51	3
도 시 과	정 원	22	1	1	4	4	8		1	3
	현 원	22		2	4	8	4		1	3
주택행정과	정 원	18		1	5	7	4			1
	현 원	19		1	6	8	3			1
도 로 과	정 원	21		1	5	9	4			2
	현 원	20		1	5	8	4			2
교 통 과	정 원	29		1	5	8	4	2		9
	현 원	30		1	6	10	3	1		9
하 수 과	정 원	17		1	3	6	3	1		3
	현 원	17		1	3	7	3			3
도시발전 기 획 단	정 원	15		1	4	7	1			2
	현 원	15		1	4	7	1			2
환경사업소	정 원	42		1	4	3	4	4		22	4
	현 원	40		1	4	6	5			21	3
차량등록 사 업 소	정 원	23		1	3	1	8			10
	현 원	23		1	3	3	6			10

ꏅ 분장사무

과 별	분 장 사 무
도 시 과	○ 도시계획결정․지적고시, 도시계획사업 시행인가 ○ 택지개발사업․구획정리사업 및 가로등관리 ○ 전문건설업 및 건설기계사업자, 건설기계조종사 관리 ○ 개별공시지가, 지적측량검사, 새주소부여사업관리
주택행정과	○ 국민주택관리․상환금 운영 ○ 주택건설사업계획승인, 사용검사, 주택정책 수립 ○ 건축인․허가, 건축심의, 건축조례 제․개정운영 ○ 주거환경개선, 구도심활성화사업, 농촌지역개발사업
도 로 과	○ 도로부지관리, 도로안내표지판 설치관리 ○ 도로포장 보수지도, 자전거도로 시설 ○ 신규도로개설 및 용지보상 ○ 가로환경 및 노점상 지도단속, 자전거이용 활성화 ○ 도로교통안전시설물 신설 및 유지관리
교 통 과	○ 교통종합계획 수립 ○ 자동차운송사업체(버스. 택시 등) 지도감독 ○ 교통정보센타운영 및 관제시스템유지관리 ○ 교통영향평가 업무 및 교통체계개선 사업 ○ 경전철 건설 업무 추진
하 수 과	○ 하수도공기업 운영, 건교부소관 국․공유재산 관리 ○ 하수처리장 건설, 하수 관거사업 추진 ○ 재난재해대책, 자연하천조성사업, 하천관리
도시발전기획단	○ 서부 신시가지 조성사업 ○ 35사단 이전사업 ○ 전주교도소 및 연초제조창 이전사업 추진
환경사업소	○ 하수․분뇨 처리시설 운영 ○ 각종 수질분석 측정관리 및 공장폐수 분석 ○ 차집관거 유지관리
차량등록사업소	○ 자동차 등록(전산입력, 자료관리 및 증명발급 등) ○ 자동차 및 건설기계 과태료부과 ○ 건설기계등록(전산입력,증명발급,검사최고,정비명령 등)

ꏅ 기본현황

○ 도시계획 연혁

년 월 일	고 시 청	번 호	계획면적 (㎢)	목표 년도	계획 인구	주 요 내 용
’38. 5. 9.	조선총독부	403	19.76	1948	100,000	도시계획구역 결정(1차)
’66. 2. 10.	건설교통부	2,188	108.71	1983	550,000	도시계획 재정비(2차)
’70. 4. 14.	″	178	157.82	1986	500,000	도시계획 재정비(3차)
’73. 6. 27.	″	258	313.20			개발제한구역 216.4㎢ 지정
’74. 8. 14.	″	272	313.20			도시계획 재정비(4차)
’76. 3. 27.	″	37	313.20			도시계획 재정비(5차)
’86. 5. 8.	″	206	313.20	1991	610,000	도시계획 재정비(6차)
’95. 6. 29.	전라북도	112	313.20	2001	860,000	도시계획 재정비(7차)
’03. 6. 26.	건설교통부	161	313.20			개발제한구역 216.4㎢해제

○ 용도지역  --------------------  4개지역 313.20㎢

구분	주 거 지 역			상 업 지 역	공 업 지 역				녹 지 지 역
	계	일반주거	준주거		계	전용공업	일반 공업	준공업	계	생산 녹지	자연 녹지
면적	29.825	29.740	0.085	3.710	6.328	1.444	4.216	0.668	273.337	4.821	268.516
비율 (%)	9.53	9.50	0.03	1.19	2.01	0.46	1.34	0.21	87.27	1.54	85.73

○ 용도지구  --------------  8개지구 15,863,698㎡ (4,799천평)

지 구 명	개 소 수	면 적(㎡)	비 고
고 도	16	8,202,200
방 화	19	3,709,784
미 관	47	1,973,284
자연취락	58	1,225,851
경 관	7	406,500
시설보호	1	249,900
아 파 트	1	90,000
보 존	2	6,179

○ 주  택

구 분	계	단독주택	다세대 주택 동당660㎡미만	연립주택 (4층이하)	아파트 (5층이상)	주택보급율 (2003년도)
주택수	182,250	58,460	4,667	4,683	114,440	90.65%
비율(%)	100	32.06	2.56	2.57	62.81

○ 지  적

(단위 : ㎢)

구분	합 계		대 지			임 야			기 타
	필지수	면적	필지수	면적	%	필지수	면적	%	필지수	면적	%
계	190,604	206.2	72,939	23.5	11.4	10,646	72.6	35.2	107,019	110.1	53.4

○ 도  로

(단위 : 개소.㎞)

구 분	계		고속국도		일반국도		지 방 도		시 도
	노선	연 장	노선	연 장	노선	연 장	노선	연 장	노선	연 장
총연장	129	391	1	5	5	65	3	22	120	299
포장도	129	391	1	5	5	65	3	22	120	299
포장율 (%)		100		100		100		100		100

※ 도로율 : 16.28%(도로면적/시가지면적)

○ 교량 및 기타시설물

(단위 : 개)

구분 계	교 량					육교 보도	지하 보도	지하차도	터널	비 고
	소계	고속 국도	시의 국도	지방도	시도
124	105		34	3	68	6	6	5	2

※ 장대교량(삼례교 : 570m,  회포대교 : 707m)

○ 건설기계조종사면허 현황

(단위 : 건)

계	불도우저	굴삭기	로우더	지게차	기중기	로울러	기타
5,694	358	1,920	485	1,378	276	109	1,168

○ 옥외광고물 현황

(단위 : 개)

광고업자 등록현황	시 지 정 광 고 시 설				비 고
	계	게시대	벽보판	기 타
410	516	150	366	-

○ 운수업체

(단위 : 개소/대)

구 분	계	버 스			택 시		화 물		렌트카	특수차	특수여객
		시내	시외	관광	회 사	개 인	회 사	개 인
업 체 수	215	5	5	16	25	2	78		20	49	15
보유대수	9,753	408	460	300	1,599	2,162	1,766	2,050	756	224	28

○ 자동차등록

(단위 : 대)

합 계	승 용 차	승 합 차	화 물 차	특 수 차
192,691	140,483	14,262	37,645	301

○ 하  천

(단위 : ㎞)

구 분		개소	하천연장	제 방 연 장			개수율 (%)	비고
				계	기개수	미개수
계		33	118.3	202.2	182.4	19.8	90.2
법정하천	소 계	30	111.9	189.4	176.0	13.4	93.0
	국가하천	3	14.8	25.6	25.6	-	100.0
	지방 1급	2	21.2	37.5	36.0	1.5	96.0
	지방 2급	25	75.9	126.3	114.4	11.9	90.6
소 하 천		3	6.4	12.8	6.4	6.4	50.0

○ 하 수 도

구 분		처리구역 (㎢)	계획연장 (㎞)	시설연장 (㎞)	미시설연장 (㎞)	보급율 (%)	비고
계		53.1	2,317	1,313	1,004	56.7
합 류 식		18.9	653	653	0	100.0
분류식	소 계	34.2	1,664	660	1,004	39.7
	오수관거	-	920	428	605	46.5
	우수관거	-	744	232	399	31.2

○ 하수․위생처리 시설

구 분	하 수 처 리	위 생 처 리
위 치	덕진구 송천동 2가 1035번지
시설용량	1일 처리능력 ⇨ 303,000㎥ - 1단계 시설 : 103,000㎥ - 2단계 시설 : 200,000㎥	1일 처리능력 ⇨ 290㎘ - 분 뇨 : 30㎘ - 정 화 조 : 260㎘
처리방법	표준 활성 슬러지법	하수 연계처리 (1994년부터 시행)

○ 차집관로

하 천 명	연 장 (㎞)	맨 홀 (개)	우수토실 (개소)	환기구 (개소)	여수토실 (개소)
계 (5개노선)	44.7	507	174	53	3
전주천 (좌, 우안)	14.3	155	112	36	2
삼 천 (좌, 우안)	10.2	82	37	16
금암천 (좌, 우안)	1.5	31	20	1
아 중 선	10.9	151	5
팔복선(공장,생활)	7.8	88			1

2004년도 시책방향

	도시공간구조 재편 광역도시 기반구축
◦ 100만 인구를 수용할 수 있는 도시기반시설 확충 ◦ 자연과 더불어 쾌적한 환경속에서 경쟁력있는 도시건설 ◦ 재난 재해의 피해발생 사전예방

⇩

	중점추진방향
◦ 광역도시 기반시설을 위한 도시계획 재정비 마무리 ◦ 미래지향적인 교통체계구축과 질높은 대중교통서비스제공 ◦ 삶의 질 향상을 위한 구 도심권 활성화 및 주거환경개선사업 추진 ◦ 도시하천의 수질개선 자연환경 보존 및 재난방재 ◦ 택지개발로 안정적인 주택공급 및 도시기반시설 구축

2004년도

주요업무추진상황

도 시 과  소 관

ꊱ	전주도시계획 재정비 추진 ----------------	13
ꊲ	도시계획 시설부지 매수청구제 시행 -------	14
ꊳ	송천지구 토지구획정리사업 ---------------	15
ꊴ	아중지구 체련공원 조성사업 --------------	16
ꊵ	토지관리 정보시스템 인터넷 확대운영 -----	17

전주도시계획 재정비 추진

ꏅ 개    요

○ 과업범위 : 전주시 도시계획구역 일원(313.18㎢)

○ 과업기간 : 2001.05 ～ 2004.12월

○ 목표연도 : 2011년           ○ 계획인구 : 760천명

ꏅ 주요내용

○ 우아동 장재마을 일원 0.165㎢ 일반주거지역으로 변경

○ 서신아파트지구 폐지 및 자연취락지구 지정(10호이상)

○ 공업지역내 취락지 용도지역변경(일반공업 ⇒ 준공업지역)

○ 일반주거지역 종세분화 □ 제1종, 제2종, 제3종

○ 공원내 집단취락지 해제(덕진․기린․산성공원)

○ 아중유원지 해제 및 송천동 유통업무설비 축소

○ 기타 미집행시설의 조정(광장, 도로, 학교 등)

ꏚ 추진실적

○ 전주시의회 의견청취(미료안건) --------- 2004.02.03

○ 행정사무조사특별위원회 구성․운영(시의회) --- 2004.02.19～03.07

○ 도시계획재정비 재검토 조사위원회 구성․운영 -- 2004.04.08～27

○ 조사위원회 조정의견에 대한 도시계획전문가 자문 - 2004.05.03

○ 조사위원회 의견 및 도시전문가 자문후 최종안 마련 - 2004.05.08

○ 도시계획재정비(안) 주민의견청취 공람 -- 2004.06.12～25

ꏚ 이후계획

○ 주민의견청취 공람(4차) --------------- 2004.07～08월중

○ 전주시의회 의견청취. 시도시계획위원회-- 2004.08월중

○ 전라북도 결정신청 --------------------- 2004.07월중

○ 전주시 도시계획재정비 완료 ------------ 2004.12월중

도시계획시설부지 매수청구제 시행

ꏅ 매수청구대상 및 절차

○ 대상 : 2001.12.31 기준 도시계획시설로 결정된지 10년이상 된

시설중 지목이“대지”인 토지에 한하여 2002.1.1부터 매수청구 가능

○ 절차 : 토지소유자 ⇒ 시장에게 매수청구

- 청구일로 부터 2년이내 매수여부 결정, 결정 후 2년이내 매수

ꏅ 매수청구 현황

○ 매수청구기간(2002.01.01 ～ 2004.06월말 현재까지)

- 신 청 건 수 : 121건  (도로 107, 공원 11,  기타  3)

- 청 구 면 적 :  24㎢  (도로  15, 공원  7,  기타  2)

- 매수 추정액 : 202억원 (도로 144, 공원  9,  기타 49)

ꏅ 추진실적

○ 소로 103개 노선폐지(L=11,138m A=75,618㎡) -- 1999.11.15

○ 소로 34개 노선폐지(L=2,656m A=18,512㎡) -- 2002.03.13

○ 장기 미집행 도시계획시설 전면재검토 -------- 2003.12

※ 불요불급한 도시계획시설 과감하게 폐지․축소

○ 매수여부 결정통보(매수 50건, 불가 10건) ---- 2004.01～06

ꏅ 이후계획

○ 연중 토지소유자로부터 매수청구 접수

○ 도시계획시설부지 매수청구시 관련부서 협의 및 전문가 의견수렴

○ 시설별 소관부서 매수여부 참조하여 분기별 최종결정

※ 참고사항

○ 2002.01월 전국도시계획운영협의회를 구성, 정부에 국비지원 요구

○ 도시계획시설사업비 국고에서 50%지원 건의(건교부⇒행자부)

송천지구 토지구획정리사업

ꏅ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 송천동 1‧2가 일원(농수산물 도매시장 남단)

○ 사업규모 : 택지조성 262,480㎡(79,400평)

○ 사업기간 : 2001.07 ～ 2005.03

○ 총사업비 : 19,890백만원(공사비 11,000. 보상비및기타 8,890)

ꏅ 추진실적(공정 68%)

○ 사업시행인가  ----------------------------- 2001.07.23

○ 공사 착공  -------------------------------- 2001.11.15

○ 문화재 발굴조사(31,400㎡)및 심의보존면적 결정 -- 2002.12.27

- 발굴유적 : 청동기시대 주거지 1기, 원삼국시대 주거지 66기 등

- 문화재 보존지역 결정 : 도로망 존치(약2,100평)

○ 도시계획변경 및 지구단위계획 결정을 위한 주민의견청취 - 2003.04.

○ 도시계획변경 및 지구단위계획 결정을 위한 도시계획위원회

자문 및 시의회 의견청취 --------------------- 2003.07.

○ 도시계획변경 및 지구단위계획구역 결정고시(전북도) - 2004.03.26

○ 환지예정지 공고에 따른 토지주 공람절차 이행 -- 2004.05.14

ꏅ 이후 계획

○ 환지예정지 지정 및 예정지 공고 ------------- 2004.07.20

○ 체비지매각 감정평가 및 환지확정측량 용역시행 -- 2004.09.20

○ 체비지 매각  ------------------------------- 2004.09.

○ 공사준공 ----------------------------------- 2004.12.

○ 환지확정 처분 및 사업정산 보고 ------------- 2005.03.

아중지구 체련공원 조성사업

○ 아중지구 개발 완료에 따른 유입인구 증가로 지역 주민들의

정서생활 향상에 기여할 공간의 조성 필요

○ 도시공원법의 도시자연공원 지정목적에 적합하고 이용 가능한

가족단위 휴식(체련)공간 조성 시급

ꏅ 공사개요

○ 위    치 : 덕진구 인후1가, 우아1가 일원(아남아파트 남측)

○ 사업규모 : 부지 49,037㎡(14,834평)

○ 총사업비 : 110억원(1단계 95,  2단계 15)

○ 사업기간 : 1단계(2002~2005), 2단계(2005~2006)

○ 내    용 : 다목적구장, 국민체육센터(수영장), 혼합경기장

조경휴게지, 배드민트장, 게이트볼장, 배구장 등

※ 국민체육센터 : 건축면적368평(연면적623평 지하1층 지상2층)

- 주요시설 : 수영장 211평(25m×6레인), 헬스장 63평

ꏅ 추진실적(공정 15%)

○ 아중지구 체련공원 조성사업 계획수립  -------- 2001.11

○ 공원조성기본계획(변경) 및 실시설계용역 완료 - 2002.11

○ 토지 및 지장물 보상 착수  ------------------- 2002.12～

○ 공사착공  ----------------------------------- 2003.11

○ 공원조성계획 변경(국민체육센터 반영) -------- 2003.12

○ 토지수용절차 이행(토지수용위원회 재결신청) -- 2004.03

ꏅ 이후계획

○ 국민체육센터 착공(건축협의중 - 전북도) ------ 2004.07

○ 체련공원(1단계) 및 국민체육센터 준공 -------- 2005.12

토지관리정보시스템 인터넷 확대 운영

토지와 관련된 모든 데이터를 전산화하는 토지관리정보체계가

완료됨에 따라 이를 인터넷에 공개하여 우리시 토지에 관련된

자료를 전국 어디서나 열람할 수 있도록 함.

ꏚ 사업개요

○ 인터넷 공개 전산자료

- 지적․임야대장 자료

- 지적․임야도면 자료

- 공시지가 자료

- 수치지형도 자료

- 토지이용계획 확인원 속성 및 도면 자료

ꏚ 추진실적

○ 토지관리정보시스템 사업 ------------- 2001.09완료

- 건교부 주관으로 12개 시․군 사업추진

○ 구청․동 에서는 민원발급 기타 모든 부서는 업무용으로 사용

ꏚ 추진계획

○ 인터넷 기반 토지정보조회시스템 개발 -- 2004.11～2005.02

○ 토지정보조회시스템 시범운영 --------- 2005.03～2005.04

○ 토지정보조회시스템 운영  ------------ 2005.05

주 택 행 정 과  소 관

ꊱ	노후화된 서민 공동주택 환경개선사업 -----	19
ꊲ	도시주거환경개선 사업 -------------------	20
ꊳ	2단계 도시주거환경개선 사업 -------------	22
ꊴ	구도심 활성화사업 -----------------------	23
ꊵ	농촌지역 주거환경개선사업 ---------------	24
ꊶ	국민주택융자금 회수 및 상환 -------------	25

노후화된 서민 공동주택 환경개선사업

ꏚ 공동주택관리 현황

구 분	소 계	전용면적별(㎡)			국민주택규모	비 고
		60미만	60~85	85초과
계	115,936	62,060	38,210	15,666	100,270
아파트	112,969	60,477	36,958	15,534	(전체 86%)	재건축제외
연 립	2,967	1,583	1,252	132		(3,488)

ꏚ 환경개선을 위한 실태조사 추진

○ 대 상 : 20년이상 노후화된 서민공동주택(33단지 95동 2,292세대)

○ 조사내용

- 공동주택, 부대시설의 안전 및 노후화 및 균열 등 위험요소파악

- 주민의 개선의지, 개발방향계획 및 지원희망시설

○ 조사결과 주민요구 주요사항

- 단지내 도로포장, 주차장확보, 하수구개량, 공동주택 외벽도색 등

ꏚ 이후계획

○ 주택법 개정(2003.11.30시행)에 따라 지원방안을 조례로 정함

- 지원시 소요비용의 50%이내에서 보조금으로 지원

- 전문가 및 단체, 주민대표자, 실무자 의견수렴 결정

- 시의회 도시건설위원회보고(간담회)후 조례안 결정

○ 대상사업 선정 및 지원실시 : 소요예산 100백만원 확보

도시주거환경 개선사업

도시저소득 주민을 위한 주거환경개선의 지속추진으로 삶의 질을

향상시키고 모든 시민이 함께 잘사는 으뜸 복지도시건설

ꏅ 사업개요

○ 대    상 : 도토리골 지구외 17개 지구,  863,571㎡(261,231평)

○ 사업기간 : 1999 ～ 2004년

○ 사 업 비 : 88,645백만원(국비 36,596 교부세 8,123 시비 43,926)

ꏅ 추진실적

○ 17개지구 지정고시  ---------------------- 1999.11.24

○ 농원지구 개선 계획고시  ----------------- 2001.12.31

(사업시행자 지정 및 협약체결완료, 전주시⇔주택공사)

○ 농원지구 사업계획 승인  ----------------- 2002.02.01

○ 낙수정지구 지정고시  ------------------- 2002.12.26

○ 낙수정지구 개선계획수립고시 ------------- 2003.05.07

○ 기반복리시설 사업추진(공정 90%)

○ 사업완료 12개지구(병사부, 마당재2, 화산2, 보문2, 도토리골,

어은2, 어은3, 밤나무골, 앞검암, 수도, 용머리2, 용머리3)

ꏅ 이후계획

○ 2004년 예산액 : 8,948백만원(국비 811 교부세 659 시비 6,978)

※시비중 3,978백만원은 국․도비 반환금으로 1회 추경 반영

○ 오목대2, 공수내, 효정, 난민촌2지구 사업완료

○ 낙수정지구 사업착수(보상협의중) ------- 2005년 완료목표

○ 인후농원(주택공사시행) : 감정평가 보상실시, 주택철거 및

사업착수 ---- 2006.12.완료예정

ꏚ 도시주거환경개선사업 지구별 현황           (단위 : 백만원)

지구명	사 업 계 획	사업비	진도(%)
계	18개 지구	88,645	90
도토리골 (진북2동)	도로개설 2, 주차장 1, 경노당 1, 어린이놀이터 1	3,389	100
어 은2 (진북2동)	도로개설 2, 주차장 1, 경노당 1, 놀이터 1, 휴게시설 1, 소공원 1	2,787	100
어 은3 (진북2동)	도로개설 6, 주차장 2, 놀이터 2, 소공원 1	5,666	100
보 문2 (인후1동)	도로개설 2	950	100
밤나무골 (금암1동)	도로개설 7, 주차장 3, 놀이터 1, 휴게시설(경노당) 1	4,991	100
앞검암 (금암2동)	도로개설 4, 주차장 1, 놀이터 1, 소공원 1	3,269	100
난민촌2 (서노,중노2)	도로개설 6, 주차장 2, 놀이터 1, 소공원 3, 경노당 2	7,234	95
병사부 (남노송)	도로개설 3, 경노당 1	2,853	100
마당재2 (중노1동)	도로개설 5, 주차장 1, 놀이터 1, 경로당 1	3,297	100
오목대 (교동)	소로개설 3, 주차장 1, 이주유도 1, 법면정비 1	4,972	95
공수내 (동․서서학동)	소로개설 14, 주차장 2, 경노당(휴게실) 1, 녹지 1	10,969	97
수 도 (동완산)	소로개설 3, 놀이터 1, 경로당 1, 이주유도 1, 법면정비 1	2,996	100
용머리2 (서완산)	소로개설 9, 주차장 3, 놀이터 2, 이주유도 1, 법면정비 1	7,686	100
용머리3 (서완산)	소로개설 5, 주차장 2, 놀이터 1, 경로당 1, 이주유도 1, 법면정비 1	5,459	100
효 정 (효자1,서완산)	소로개설 10, 주차장 1, 놀이터 1, 경로당 1, 소공원 2	10,562	90
화 산2 (중화산1)	소로개설 6, 주차장 1, 놀이터 2, 휴게시설 1	4,448	100
인후농원 (인후1)	공동주택 423세대 ․사업계획승인 : 2002. 2. 1	3,000	5
낙수정 (교동)	소로개설 10, 주차장 1, 놀이터 1, 경로당 1, 이주유도 2, 상수도가압시설, 급․배수관교체	3,922	30

2단계 도시주거환경개선 사업

ꏚ 사업개요

○ 대상지구 : 대동지구외 20개지구( 완산 12, 덕진 9)

○ 사업면적 :1,535,773㎡(464,571평), 건물동수 : 5,237동(6,256세대/23,420인)

○ 사업기간 : 2005 ~ 2010년(6개년 연차사업)

○ 예상사업비 : 125,500백만원(국비62,750. 도비12,550. 시비50,200)

○ 사업내용

- 소로개설121개노선, 공원조성14개소, 공용주차장49개소, 놀이터6개소 등

- 주택개량자금 지원(연리 3%, 1년거치 19년 균등분할상환)

- 담장없애기 등 동네공원화 사업추진(실시설계 반영 추진)

ꏚ 그간 추진상황

○ 실태 및 사업예정지구 조사 ------------ 2003.06.01~06.30

○ 건교부 및 교수 주공 현지실사 --------- 2003.08.21

○ 건교부 2단계 사업지구 선정 발표 ------ 2004.03.16

- 주거환경이 불량한 정도에 따라 선정(전국430, 전북61, 전주21)

ꏚ 기대효과

○ 붕괴우려 주택 및 축대 등 개․보수로 재해 및 재난예방

○ 기반시설 정비 및 도심지내 저소득층의 거주지 마련 가정회복

○ 지역경제 활성화 및 건설노동자 일자리 창출 기여

ꏚ 행정사항

○ 정비구역지정 및 개선계획 수립 추진

- 도시주거환경정비 기본계획 용역과 병행 시행

○ 정비사업 추진 ---------------------------- 2005~2010

구도심 활성화사업

ꏅ 사업개요

○ 대    상 : 구도심권 14개동 12㎢

○ 개    요

- 특화거리 조성 6개소, 주차장 확충 4개소, 오픈스페이스정비 등

○ 사업기간 : 2002.08 ～ 2011.12(10개년)

○ 사 업 비 : 41,252백만원

- 2003이전 예산액 : 5,846백만원

(주차장 4,000  차이나 1,346  영화거리 500 등)

- 2004년 예산확보 : 1,000백만원

(차이나거리조성 450, 도정법용역 150, 보조금 300, 이벤트 100)

ꏅ 추진실적

○ 구도심활성화 방안연구 용역 시행 --------------- 2003.03

○ 구도심활성화 민․관협력추진위원회의 개최(7회)

- 학계, 전문가, 민간단체, 주민대표 등 21명

○ 구도심활성화사업 지원 조례 공포 --------------- 2003.12

○ 차이나거리 조성공사 시행(공정 90%)

ꏅ 이후계획

○ 차이나거리 조성 완료 --------------------------- 2004.07

○ 도시․주거환경정비 기본계획수립 용역 실시(완료 2006.06) -- 2004.08

○ 구도심 활성화 보조금 지급(우선 4대문안) ------- 2004.08

ꏅ 문제점 및 대책

○ 구도심활성화 및 공동화방지를 위하여 지속 확대 추진

- 특화거리기반시설조성 및 이벤트 행사로 구도심 활성화 다각적 검토

- 건축시 건폐율 용적율 주차장 설치비용 납부 감면 및 보조금

지원 수혜 확대

농촌지역 주거환경개선사업

도․농간 지역균형 발전으로 열악한 농촌 주거환경 기초시설을

확충하여 질적 수준 향상 도모

ꏅ 사업개요

○ 사 업 명

- 농촌지역 중장기 개발 기본계획 수립을 위한 용역

․ 생활환경 기반시설정비 및 소득증대 계획수립

․ 국제농업시장개방에 따른 대응책 마련

- 농촌 주거환경개선(마을정비)사업

․ 하수처리시설, 도로포장 등 기반시설

- 농촌 환경개선(숙원)사업

․ 마을기반시설(도로포장, 하수도 등)사업

○ 사 업 비 : 4,319백만원(국비1,388  도비560 시비2,371)

ꏅ 추진실적

○ 농촌지역 중장기개발 기본계획 용역 : 131백만원

- 210개마을 430㏊ 전지역 조사완료

- 전문가 의견수렴 및 시의원 간담회

○ 농촌주거환경개선(마을정비)사업 4개지구 : 원석구, 한절리, 삼천, 오매

-  제1회 추경 예산확보 : 2,188백만원(국비1,388  도비560  시비240)

○ 농촌환경정비(숙원)사업 추진 : 2,000백만원

ꏅ 이후계획

○ 농촌지역 중장기개발 기본계획 용역

- 다양한 전문가 의견 수렴 등

- 농촌지역 중장기개발 기본계획 용역 완료예정 -- 2004.07.30

○ 농촌주거환경개선(마을정비)사업

- 기본 및 실시설계용역 -------------------- 2004.07~08

- 공사시행 -------------------------------- 2004.08~12

○ 농촌환경개선(숙원)사업

- 실시설계 -------------------------------- 2004.06~08

- 시공 및 준공 ---------------------------- 2004.08～12

국민주택융자금 회수 및 상환

국민주택 융자금 자진 상환 유도와  고질․고액 연체자에 대하여

강력한 징수를 통하여 체납사고 사전 불식 및 체납액 회수

ꏅ 융자금 현황

○ 차  입  액 : 3,467세대  21,160,700천원

○ 조      건 : 1년거치 19년 체증식상환

○ 상환  기간 : 1977 ～ 2008년

○ 상환  금리 : 약정이자 연 6%(연체이자 연12%)

ꏅ 추진실적

○ 상 환 액 : 18,013,228천원(85.1%)

○ 상환잔액 :  3,147,472천원

ꏅ 이후계획

○ 2004년 상환예정액 : 1,871,704천원

- 상환액 : 548,739천원(원금 459,418.  이자 89,321)

○ 고액체납자 방문독려 지속 실시

○ 연체자 납부독촉장 발부(수시)

○ 실소유자 인적사항조사(임의 소유권이전 및 매매자)후 징수독려

○ 근저당 설정금액 도달체납자 경매예고

- 체납액 : 65건  529,617천원

도 로 과 소 관

ꊱ	자전거타기 활성화 -----------------------	27
ꊲ	장승백이길(남부순환도로) 개설 -----------	28
ꊳ	남천로(전주천 좌안도로) 확장 ------------	29
ꊴ	녹두길(전주진입로) 확장 -----------------	30
ꊵ	대학로 개설 및 확장 ---------------------	31
ꊶ	동산고가교 접속도로 확장 ----------------	32
ꊷ	견훤로 개설 -----------------------------	33
ꊸ	문화로 확장 -----------------------------	34
ꊹ	태평로 확장 -----------------------------	35
	남도주유소～고속터미널간 도로확장 -------	36
	중앙분리대(화단) 설치 -------------------	37
	안전한 도로시설물 관리 ------------------	38
	자전거도로 확충 -------------------------	39
	교통안전시설물 확충 및 정비 -------------	40

자전거타기 활성화

○ 폭증하는 자동차 1천4백만대 시대의 심각한 도시교통․환경․

에너지문제 개선

○ 자전거이용의 생활화로 녹색환경도시 건설의 시민의식 전환

ꏚ 추진실적

○ 주말 자전거 여행 : 7회 520명

○ 자전거이용 시범학교 자전거타기 행사 - 2004.05.15(토)   600명

○ 전주시민 자전거 대행진 행사 ------ 2004.06.12(토) 2,000명

○ 자전거타기 활성화 홍보용 전단지 제작 : 20,000매

○ 자전거이용 시범학교 지정운영 : 23개교(중학교 16, 고등학교 7)

○ 자전거 관련 홈페이지 개설 -------- 2004.06.01

ꏚ 이후계획

○ 자전거타운동 활성화 지속추진 : 시범학교, 주말자전거여행 운영 등

- 자전거동호회 : 매주 1회 자전거타기 실시

○ 주부 자전거교실 운영 : 1개소(덕진종합경기장)

○ 초․중학생 자전거 안전교육 실시 : 1회

○ 주말 자전거 테마여행 지속실시 :  10회

○ 하반기 전주시민 자전거 대축제 실시 ------- 2004.10월중

○ 누구나 손쉽게 이용할 수 있는 자전거 관련 홍보

- 언론홍보(MBC TV, 라디오)

- 더불어사는전주 게제 홍보 및 자전거 관련 팜프렛 제작

장승백이길(남부순환도로) 개설

공수교

좁은목

평화광장

2 단 계

거산황궁

ꏚ 사업개요

○ 구    간 : 동서학동 좁은목 ～ 효자동 금구선(시의국도 27호선)

○ 사 업 량 : 연장 7,250m   폭 25～35m

○ 사 업 비 : 114,579백만원(양여금 31,980.  시비 82,599)

○ 사업기간 : 1988 ～ 2007(20개년)

※ 2단계(함대부락～금구선) 1,570m ⇒ 16,500백만원

ꏚ 추진실적(1단계공정 76.5%   투자액 69,679백만원)

○ 개  통 : 공수교～중인선(4,180m - 61,279백만원) - 1988～1997

○ 용지매입 완료(장승백이길～거산황궁ⓐ : 640m 8,400백만원) - 2003

《2004 추진계획》 ---  35.0%

○ 위    치 : 장승백이길 ～ 거산황궁ⓐ ～ 무궁화주유소

○ 사 업 량(용지매입 및 공사)  L=973m

- 용지매입 및 공사(2004예산)

∙ 도로개설(공수교 ～ 장승로) : 200m

∙ 도로확장(거산황궁ⓐ ～ 무궁화주유소) : 333m

- 공사추진(2003예산) : 장승백이길 ～ 거산황궁ⓐ - 440m

○ 확보예산 : 4,188백만원(양여금 - 2,288. 시비 1,900)

※ 2003년도 이월예산 : 1,200백만원

ꏚ 이후계획(1개노선  L=860m  --  24,212백만원)

○ 거산황궁ⓐ～좁은목  L=860m   B=25m

※ 2단계사업 : L=1,570m  --------------- 16,500백만원

남천로(전주천 좌안도로) 확장

ꏚ 사업개요

○ 구    간 : 동서학동 한벽교 ～ 서신동 서신교(시의국도 1,27호선)

○ 사 업 량 : 연장 4,150m    폭 8～12 ⇒ 25m

○ 사 업 비 : 45,336백만원(양여금 27,200.  시비 18,136)

○ 사업기간 : 1998 ～ 2007(10개년)

※ 2단계(완산교～서신교) 2,140m ⇒ 14,700백만원

ꏚ 추진실적(1단계공정 90.5%    투자액 27,576백만원)

○ 개 통(L=1,810m   B=25m)

- 한 벽 교～싸전다리(L=1,050m B=25m) --- 2002.05

- 초록바위～매 곡 교(L=  760m B=25m) --- 2003.12

《2004 추진계획》 ---  공정 : 41.0%

○ 위    치 : 싸전다리 ～ 초록바위

○ 사 업 량(용지매입 및 공사) : L=200m   B=8⇒25m

○ 확보예산 : 2,877백만원(양여금 2,102. 시비 775)

- 공사 마무리     -----------------  2,877백만원

※  2단계 실시설계 용역 추진중

ꏚ 이후계획

○법면 부지보상 : 183백만원

○ 2단계사업 시행(완산교～서신교  L=2,140m B=12m)-14,700백만원

녹두길(전주진입로) 확장

전북은행

한방병원

추천대교

ꏚ 사업개요

○ 구    간 : 원대한방병원 ～ 팔복동 BYC(시의국도)

○ 사 업 량 : 연장 1,360m    폭 35 ⇒ 50m

○ 사 업 비 : 17,000백만원(국비 5,000.  양여금 7,200.  시비 4,800)

○ 사업기간 : 1999 ～ 2005(7개년)

ꏚ 추진실적(공정 43.0%    투자액 6,800백만원)

○ 개통(L=710m  B=50m)

- 추천대교(L=150m)  ------------------------ 1999.12

- 원대한방병원～추천대교(L=560m B=50m) -- 2003.12

《2004 추진계획》 ---  보상공정 : 80.0%

○ 위    치 : 추천대교 ～ 동화약품(시내 ⇒ 팔복동간 좌측)

○ 사 업 량 : L=300m

- 토지매입 : 20필지 1,347㎡.   건물 11동

- 공 사 비 : 옹벽시공 L=300m

○ 확보예산 : 1,686백만원(양여금 1,386. 시비 300)

- 용지매입 : 1,050백만원     - 폐기물처리 : 274백만원

- 공 사 비 :   362백만원

ꏚ 이후계획

○ 추천대교～BYC(L=650m  B=50m) ---- 8,514백만원

대학로 개설 및 확장

ꏚ 사업개요

○ 구    간 : 금암동 사대부고 ～ 도립국악원(시의시도)

○ 사 업 량 : 연장 2,330m    폭 25～35m

○ 사 업 비 : 23,441백만원(양여금 10,405.  시비 13,036)

○ 사업기간 : 1995 ～ 2005(11개년)

ꏚ 추진실적(공정 82.0%   투자액 20,950백만원)

○ 개  통 (L=1,330m  B=25～35m)

- 사대부고 ～ 연화마을(L=1,200m  B=25m) --- 1995～1999

- 송천삼거리～도립국악원(L=130m B=35m) -- 2003.12

《2004 추진계획》 ---  공정 35.0%

○ 위    치 : 연화마을 ～ 덕진파출소

○ 사 업 량 : L=880m

- 공사(2002이월사업 마무리) : 560m --- 1,335백만원

- 용지매입 및 공사 : 320m  --- 2,078백만원

○ 확보예산: 2,078백만원(양여금 1,578. 시비 500)

ꏚ 이후계획

○ 공사 마무리(인도조성) --------------------- 193백만원

○ 한전지중화사업 추진   --------------------  220백만원

동산고가교 접속도로 확장

동산고가도

동부우회도로

동 산 역

ꏚ 사업개요

○ 구    간 : 동산동 동산고가교 ～ 동산역(시의시도)

○ 사 업 량 : 연장  340m   폭 18.5 ⇒ 35m

○ 사 업 비 : 2,990백만원(시비)

○ 사업기간 : 2003 ～ 2005(3개년)

ꏚ 추진실적(공정 7.0%    투자액 200백만원)

○ 용지매입완료(10필지 779㎡)  ----------------  2003.12

《2004 추진계획》

○ 위    치 : 동산고가교 ～ 동산역

○ 사 업 량 (공사) ; L=340m  B=8.25m(반폭)

○ 확보예산 : 640백만원(시비)

※실시설계용역 착수 : 2004.06.18 ～ 08.30

ꏚ 이후계획

○ 동산고가교～동산역(L=340m, B=8.25 - 반폭) ---- 2,150백만원

견 훤 로   개 설

마 당 재

기린봉APT

기 린 로

ꏚ 사업개요

○ 구    간 : 중노송동 마당재 ～ 교동 기린로(리베라 호텔앞)

○ 사 업 량 : 연장 1,650m   폭 30m

○ 사 업 비 : 27,000백만원(시비)

○ 사업기간 : 1999 ～ 2007(9개년)

ꏚ 추진실적(공정 44.0%   투자액 13,820백만원)

○ 개 통 : 마당재～기린봉ⓐ(L=560m  11,900백만원) --- 2001.12

○ 용지매입완료 : 기린봉ⓐ～농원마을(L=220m 1,920백만원) - 2003.12

《2004 추진계획》  ---  공정 : 99.0%

○ 위    치 : 기린봉ⓐ ～ 농원마을

○ 사 업 량 : 26동 건물철거 및 6,047톤 폐기물 처리

○ 사 업 비(2003 이월사업비) : 186백만원

※ 도시계획 재정비에 포함하여 노선변경 절차 이행중

ꏚ 이후계획

○ 농원마을～기린로(L=1,090m) 보상 및 공사 -- 13,180백만원

문 화 로  확 장

전주고등학교

ꏚ 사업개요

○ 구    간 : 중노송동 정보영상진흥원 ～ 전주고(시의시도)

○ 사 업 량 : 연장  220m    폭 22⇒25m

○ 사 업 비 : 1,281백만원(시비 831.  민자 450)

○ 사업기간 : 2004 ～ 2005(2개년)

ꏚ 추진실적(공정 2.0%   투자액 18백만원)

○ 실시설계용역완료  --------------------------  2003.12

《2004 추진계획》

○ 위    치 : 전주고등학교 구간

○ 사 업 량(용지매입 및 공사) : L=190m  B=22⇒25m

○ 확보예산 : 902백만원(시비 452.  까르프 부담 450)

※ 인적자원부 소관 국유지 무상 관리환 추진(4필지 205㎡)

ꏚ 이후계획

○ 정보영상진흥원～진안사거리(L=30m B=22⇒25m) - 361백만원

태  평  로   확  장

역 천 로

구MBC

ꏚ 사업개요

○ 구    간 : 구 MBC사거리 ～ 대동길(시의시도)

○ 사 업 량 : 연장  900m    폭 13 ⇒ 25m

○ 사 업 비 : 11,000백만원(양여금 6,600.  시비 4,400)

○ 사업기간 : 2004 ～ 2008(5개년)

《2004 추진계획》

○ 위    치 : 구 MBC ～ 동양아파트

○ 사 업 량(보상) : L=200m  ------  21필지 1,400㎡

- 분할측량 완료

○ 확보예산 : 869백만원(양여금)

ꏚ 이후계획

○ 구 MBC～구 파출소(L=900m)  --------  10,131백만원

남도주유소～고속터미널간 도로확장

남도주유소

고속터미널

ꏚ 사업개요

○ 구    간 : 금암동 남도주유소 ～ 고속터미널간(시의시도)

○ 사 업 량 : 연장 500m    인도조성 B=5m

○ 사 업 비 : 300백만원(시비)

○ 사업기간 : 2004 ～ 2008(5개년)

《2004 추진계획》

○ 도시계획변경 절차이행(25⇒20m) --------------- 2004.12

○ 확보예산 : 200백만원(도비)

※ 도시계획 재정비시 도시계획 변경 결정후 설계 및 사업추진 가능

⇒ 노폭 축소시 인도조성

ꏚ 이후계획

○ 실시설계 용역  ------------------------------  2005.06

○ 사업시행   ----------------------------------  2005.12

중앙 분리대(화단) 설치

중앙분리대(화단) 설치로 중앙선 침범과 무단횡단으로 인한 교통

사고를 예방하여 고귀한 생명을 보호하고 녹색환경 도시건설

ꏚ 사업개요

○ 설치대상 : 4차선이상 도로(경전철 예정노선 제외)

○ 사 업 량 : 49개 노선  68.9㎞

○ 사 업 비 : 15,000백만원(국 7,500.  시 7,500)

○ 사업기간 : 2002 ～ 2006

ꏚ 추진실적

○ 중앙분리대 정비계획 수립 ---------------------- 2003.06

○ 녹두길외 8개 노선 12.8㎞ 설치완료

- 투자사업비 : 2,900백만원(국 1,450.  시 1,450)

ꏚ 이후계획

○ 사 업 비 : 3,900백만원(국 2,300.   시 1,600)

○ 설치계획 : 5개 노선  16㎞

- 추진중 : 기린로, 남고로, 쑥고개길(공정30%)

- 설계중 : 월드컵로, 아중로

안전한 도로시설물 관리

ꏚ 사업개요

○ 사 업 량 : 105개소

※ 시설물 안전관리에 관한 특별법 대상 시설물 26개소

(1종 시설물 5개소, 2종 시설물 21개소)

○ 사업기간 : 2003 ～ 2007(5개년 단위 지속추진)

○ 사 업 비 : 10,700백만원

※ 2004년 사업비 : 515백만원(시비)

ꏚ 추진실적

○ 노후교량(남천교)재가설 실시설계 용역

○ 2004년 노후교량 재가설 및 보수․보강공사 추진

- 남천교 및 원색장교 재가설(원색장교는 건교부 익산청 추진)

- 정밀안전진단 결과에 따라 삼례교 보수공사 추진 -- 2004.07～09

ꏚ 이후계획

○ 시특법 대상 시설물중 19개소 정밀점검(2년1회 이상)시행

------------------------------------  2004.07～12

○ 노후교량(남천교) 재가설 사업비 확보

○ 안전사고 예방을 위해 교량 정밀안전진단 및 보수보강 사업비 연차적 확보시행

자전거도로 확충

ꏚ 사업개요

○ 사 업 량 : 자전거도로 99개노선 325㎞

(자전거도로 135. 기타사업 190)

○ 사업기간 : 1997 ～ 2006년(10개년)

○ 사 업 비 : 32,500백만원

※ 2004년 소요예산 : 2,048백만원(국비1,098. 도비150. 시비800)

ꏚ 추진실적

○ 2003년까지 자전거도로 251㎞, 자전거보관대 444개소 16,061대분

- 구 전라선 철도부지내 자전거 레져도로 2.0㎞

○ 2004년도 자전거도로 시범권역 우선순위에 의거 시행

- 완주공단 진입로 4.2㎞

- 아중․인후지역 5.0㎞,  덕진․송천지구 5.0㎞

※ 삼천, 만경강 등 하천내 자전거 레져도로 병행 추진

ꏚ 이후계획

○ 완주공단 진입로 자전거도로 실시설계 용역중으로 용역

완료 후 사업시행

○ 금후 자전거 레져도로 사업시행 여부 검토 추진

교통안전 시설물 확충 및 정비

교통안전사고를 획기적으로 줄여나가기 위한 3년차 해로 시설의

확충 및 정비를 통한 안전하고 쾌적한 교통환경 조성.

- 차량중심에서 교통약자인 보행자 중심으로 개선 -

ꏅ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 관내

○ 사업기간 : 2004.01 ～ 2004.12

○ 사 업 비 : 5,590백만원(국비2,181.  시비3,409)

○ 사업내용

- 교통안전시설 확충정비(차선도색외 7개사업) - 2,000백만원

- LED 신호등 설치 45개 교차로 -------- 772백만원(국비)

- 사고잦은지점 불합리한 교차로 구조개선 3개소  -  182백만원(국비50%)

- 어린이보호구역 정비 및 개선 14개교 - 2,636백만원(국1,318 시1,318)

※ 시비 미확보 ----- 590백만원

ꏅ 추진실적

○ 교통안전시설 확충정비(8개사업 2,000백만원)

- 공사착공 -------------------------- 2004.04(공정 50%)

○ LED 신호등 설치사업(45개교차로 772백만원)

- 공사착공 -------------------------- 2004.05(공정 60%)

○ 교통사고잦은곳 구조개선사업(3개소 182백만원)

- 공사착공 -------------------------- 2004.05(공정 40%)

○ 어린이보호구역 정비사업비(시비) 1회추경 확보-419백만원

ꏅ 이후계획

○ 교통안전시설 확충정비 지속추진  ------------ 2004.12

○ LED신호등 설치사업 준공  ----------------- 2004.08.14

○ 불합리한 교차로 구조개선공사 지속추진  ----- 2004.12

○ 어린이보호구역정비 시비 확보분 시행 -------- 2004.07～12

교 통 과  소 관

ꊱ	시내버스 정보안내시스템(BIS) 구축 -------	42
ꊲ	교통신호 운영체계 개선 -------------------	43
ꊳ	교통정체지역 특별소통대책 추진 -----------	44
ꊴ	거주자 우선주차제 시범실시 ---------------	45
ꊵ	가련산공원 주차장 조성 -------------------	46
ꊶ	주차시설 관리공단 설립 추진 --------------	47
ꊷ	전주경전철 건설 -------------------------	48

시내버스 정보안내시스템(BIS) 구축

시내버스 운행과 관련된 각종 정보의 실시간 제공 및 효율적인

운행관리를 통하여 대중교통 서비스 향상 및 이용 활성화 도모

ꏚ 사업개요

○ 사업내용

- 도로장치 : 노변기지국 193식, 정류장 안내단말기 104개

- 차량장치 : 차량용단말기 410개, 차량내 안내단말기 94개

- 기    타 : 키오스크(KIOSK) 11개, 대형 LCD 정보판 등

○ 대상노선 : 팔달로, 충경로 등 14개 노선

○ 사 업 비 : 3,432백만원

○ 사업기간 : 2003.10 ~ 2004.08(10개월)

ꏚ 추진실적

○ 시스템 설치 완료 ------------------------- 2004.04.30

- 정류장안내단말기, 노변기지국, 차량용단말기, 차량내단말기,

키오스크 등

- 센터시스템 구축 및 상황실 구축 완료 ----- 2004.03.30

○ 통신망 개통 완료 ------------------------- 2004.06.10

※ 전체 진행 공정율 : 96.7%

ꏚ 이후계획

○ 시험운영 및 안정화 ----------------------  2004.08

○ 상용서비스 실시 -------------------------  2004.09

교통신호 운영체계 개선

○ 전자신호와 신신호체계의 통합운영 및 신신호체계의 지속적인

확장․개선으로 교통소통 촉진을 통한 간선도로 기능 회복

○ 교차로․가로구간의 교통량 분석 및 DB구축으로 신호운영 개선

ꏚ 현    황

○ 교통신호 제어기 307개(전자신호 245  신신호 62)

- CCTV 35,  VMS 17,  잔여표시기 470,  음향신호기 150

ꏚ 사업개요

○ 사업내용

- 교통신호제어시스템 개선

- 교통상황관제(CCTV) 및 상황판 개선

○ 사업기간 : 2004.01 ～ 2005.10

○ 사 업 비 : 3,400백만원

ꏚ 추진실적

○ 기본설계 완료 ------------------------------- 2004.05

ꏚ 이후계획

○ 사업발주의뢰(조달청) -----------------------  2004.07

○ 사업자선정 및 계약체결 ---------------------  2004.10

○ 시험운영 및 사업완료  ----------------------  2005.10

ꏚ 사업효과

○ 교차로 처리교통량 15% 증, 교차로 제체도 10%(10초) 감소,

가로구간 통행속도 10% 이상 증가(첨두시간대 25㎞/시)

교통정체지역 특별소통대책 추진

○ 교통정체지역 특별관리로 교통 소통 도모

○ 교통정체지역 현장점검 및 결과분석으로 소통 개선

ꏚ 추진지표

○ 평일 첨두시 평균속도 15㎞/시 미만구간 ⇨ 20㎞/시 이상

- 통일광장～경기장4거리(백제로)등 7개노선 총연장 15㎞

․ 서진로 0.85 장승로 4 백제로 0.86 용머리길 1.85 팔달로 5.5 충경로 1.3 송천로 0.5

- 통일광장(롯데백화점)등 정체교차로 65개소

ꏚ 추진방안

○ 교통정체지역 교통량 조사 및 기하구조 개선 수립 용역시행

- 용 역 비 : 150백만원

- 용역내용 : 정체 및 혼잡 교차로 기하구조 개선 수립 등

- 용역기간 : 2004.06 ～ 2005.05

○ 불법주정차 무인단속시스템 구축

- 사 업 비 : 150백만원

- 사업내용 : 교통소통 장애 불법주정차지점 단속카메라설치(3개소)

- 사업기간 : 2004.07 ～ 2004.12

ꏚ 추진실적

○ 교통운영개선(TSM) 용역 시행 ------------ 2004.06

ꏚ 이후계획

○ 교통량 및 교차로 기하구조 조사 : 수시

○ 불법주정차 무인단속 시스템 구축 ---------- 2004.07～12

- 타시사례 벤치마킹(서울 강남구 등) ------- 2004.07

○ 교통운영개선용역 중간 보고회 ------------- 2004.12

○ 교통운영개선용역 최종 보고회 및 용역완료 - 2005.05

거주자 우선주차제 시범 실시

○ 공공 주차시설 확충은 재원확보가 어려워 주차수요 충족 곤란

○ 블록별 주차수요관리 방안으로 주거지 전용주차제를 도입하여

편리한 주차환경을 조성하고 주차질서 표준모델로 개발

ꏅ 추진방안

○ 대상지구 : 주택밀집, 주거 및 상가가 혼재된 주차난 극심지역

- 구청별로 1～2개지역 선정 시범 운영

○ 규    모 : 간선, 이면도로로 구획되는 동일생활권 500～1,000가구

○ 추진기간 : 2004.06～ 2005.02

○ 사 업 비 : 100백만원(현황조사, 주차구획선 설치)

ꏅ 추진실적

○ 시행방침 결정 및 지침시달  ----------------- 2004.06.21

○ 전주시교통정책자문위원회 개최 -------------- 2004.06.25

ꏅ 이후계획

○ 대상지역 조사(주차수요 및 주차시설 현황) --- 2004.07.20

○ 시범지구 선정 ------------------------------ 2004.08

- 주민 여론조사, 공청회 실시, 교통정책심의위원회 의견 수렴

○ 주차시설 확보계획 수립 및 지구설계 --------- 2004.09

○ 통행방법 결정 및 시설물 설치 --------------- 2004.10～11

○ 주차구획 배정 ------------------------------ 2004.12

○ 시범운영  ---------------------------------- 2005.01～02

○ 정상운영(주차요금 징수 및 단속활동) -------- 2005.03.01

가련산공원 주차장 조성

자동차의 급격한 증가로 인한 도시주차문제에 적극적으로 대처하기

위하여 가련산공원 주차장 시설지구에 공영주차장을 조성 시민들에게

주차편의 제공

ꏅ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 덕진동 2가 224-3번지 외 8필지

○ 규    모 : 2,595㎡(785평)  ※ 주차능력 : 56면

○ 사업기간 : 2003.10 ～ 2005.06

○ 사 업 비 : 720백만원(토지매입130, 공사비590)

- 예산확보 : 420백만원

ꏅ 추진실적

○ 주차장부지 일부(696㎡) 매입

- 국유지(재무부) 369㎡포함 1,065㎡확보

○ 주차장 시설계획 수립 ----------------------- 2002.04

○ 실시설계 완료 ------------------------------ 2003.06

○ 사업시행인가 ------------------------------- 2003.07

○ 토지 및 지장물 협의매입 : 2필지 885㎡(소유자 : 임재현)

ꏅ 이후계획

○ 감정재평가 시행(4필지) --------------------- 2004.06~07

○ 토지 및 지장물 협의매수 추진 --------------- 2004.07～09

○ 공사착공 ----------------------------------- 2004.10

주차시설관리공단 설립 추진

○ 공영주차장의 효율적인 관리로 도심지역 주차난을 해소하고

○ 주차질서를 확립하여 원활한 교통소통과 선진 교통문화의 조기

정착을 유도하고자 함

ꏚ 공단 설립개요

○ 공단의 명칭 : 전주시주차시설관리공단

○ 설 립 시 기 : 2005.01월

○ 공단의 사업

- 공영주차장 관리 운영

- 불법주정차 견인 업무

- 노상 방치차량 견인 업무

○ 공단의 인력 : 2개팀 64명(이사장1, 일반직6, 기능직16, 일용직41)

○ 자본금 출자 : 7억원

ꏚ 추진실적

○ 전주시교통정책자문위원회 개최 -------------- 2004.06.25

ꏚ 이후계획

○ 설립타당성 심의위원회 개최 ----------------- 2004.07

○ 시의회(도시건설위원회) 간담회 개최 --------- 2004.07

○ 공단설치 및 운영조례 제정 ------------------ 2004.07

○ 이사장 임면, 정관, 인사․보수 등 19개 제규정 작성 -- 2004.08～10

○ 직원채용 및 업무 위탁계약 체결 ------------- 2004.11～12

○ 출자금 확보 및 법인설립 등기 --------------- 2004.12

전주경전철 건설

자동차의 급증과 도로시설 공급의 한계로 인하여 계속 심화되고 있는

도심지역의 심각한 교통난 해소 및 고품질의 대중교통서비스 제공

- 정시성, 안전성, 대량수송이 가능한 무공해 신 대중교통수단 도입 -

ꏚ 사업개요

○ 시스템 및 노선연장 : 노면전차(Tram)  24.29㎞

- 1단계(2011) : 송천역～경기장～팔달로～꽃밭정이네거리

～ 삼천농수산시장(14.19㎞)

- 2단계(2014) : 전주역～곰솔나무길～꽃밭정이네거리

～평화 3지구(10.10㎞)

○ 사 업 비 : 4,671억원(국비 930 도비 465 시비 487 민자 2,752)

○ 사업기간 : 2001 ～ 2014(14년간)

ꏚ 추진실적

○ 국토연구원 민간투자지원센터(PICKO)사업성 검토 -- 2004.01.26

- 검토결과 : 민간투자사업으로 추진 가능

○ 전주시교통정책자문위원회구성 운영(9회) ------- 2004.03～06

- 시민여론조사로 사업추진여부 결정 및 운수업계 애로해결․협의 병행

○ 전주경전철 건설사업 전주시민 설문조사 실시 -- 2004.06.07

- 유효표본 1,559명 중 찬성 67.9%, 반대 27.9%, 무응답 4.2%

ꏚ 이후계획

○ 도시철도기본계획승인요청(전주시⇨전북도) ---- 2004.07

○ 민간투자대상사업 지정 신청(전주시⇨기획예산처) -- 2004.07

○ 전주경전철 기본설계 가격 입찰 실시 ---------- 2004.07

○ 도시철도기본계획 승인 및 민간투자대상사업 지정 - 2005년 상반기

하 수 과  소 관

ꊱ	하수처리장 3단계(1차) 증설사업 ----------	50
ꊲ	하수처리장 1․2단계 고도처리사업 --------	51
ꊳ	하수처리장 슬러지처리 시설사업 -----------	52
ꊴ	화산․덕진처리구역 하수관거 정비사업 -----	53
ꊵ	농촌마을 하수도 정비사업 -----------------	54
ꊶ	금암동주변 하수관거 정비사업 -------------	55
ꊷ	삼천 자연형하천 조성사업 -----------------	56
ꊸ	만경강 생태하천 가꾸기 사업 --------------	57
ꊹ	재난․방재업무 추진 ----------------------	58

하수처리장 3단계(1차) 증설사업

○ 인구증가로 급속히 증가하는 하수를 원활히 처리하여 수질개선

및 환경보존

○ 하수량증가로 인한 방류수역인 전주천, 만경강, 새만금 유역

수질오염 방지

ꏅ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 송천동2가 1035번지 일원

○ 사업규모 : 100천㎥/일, 오수유입 관로정비 L=10㎞

○ 총사업비 : 79,705백만원(양 37,542.  지 31,563.  민투 10,600)

※ 2004예산 : 20,099백만원

○ 사업기간 : 1998 ～ 2005.12

ꏅ 추진실적(공정 80%)

○ 민간위탁 협약 ------------------------------- 2002.02

○ 공사 착공 ----------------------------------- 2002.05

○ 주요구조물 완료(생물반응조,소독조,여과지등) ----- 2004.05

○ 건축구조물 및 부지조성 완료 ----------------- 2004.06

ꏅ 이후계획

○ 기계,전기,계장,조경공사 및 부대공사 마무리 ------- 2004.09

○ 시운전, 완공 --------------------------------- 2004.11

○ 민간위탁운영(전주개발) ---------------------- 2004.12

○ 오수유입 관로정비 --------------------------- 2005.12

하수처리장 1‧2단계 고도처리사업

○ 2001.09월 하수도법 개정으로 강화된 수질기준에 맞게

하수처리장 고도처리시설 개선

○ 만경강 새만금 수질개선을 위한 고도처리 공법 도입필요

ꏅ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 송천동2가 1035번지 일원

○ 사업규모 : 303천톤/일

○ 총사업비 : 60,000백만원(양 30,000.  지 30,000)

※ 2004예산 : 2,134백만원

○ 사업기간 : 2002.03 ～ 2007.

ꏅ 추진실적

○ 기본계획 및 입찰안내서 작성 용역 -- 2002.06～2003.10

○ 고도처리사업 실시설계 적격업체결정(조달청) -- 2004.03

○ 실시설계 ------------------------- 2004.04～2004.08

ꏅ 이후계획

○ 실시설계적격 심의 및 시공업체선정 확정 ----- 2004.09

○ 착공(30개월) ------------------------------- 2004.10

○ 준공 --------------------------------------- 2007.

하수처리장 슬러지 처리 시설사업

○ 하수슬러지 해양투기로 인한 해양오염을 예방하고 소각 및

자원화 등 처리방법을 검토하여 최적의 방안으로 시설

○ 해양투기 금지로 인한 하수슬러지 처리문제를 사전 대처

ꏅ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 송천동 2가 1035번지 일원

○ 사업규모 : 150톤/일

○ 총사업비 : 14,000백만원(양 7,000.   지 7,000)

※ 2004년 예산 : 2,884백만원

○ 사업기간 : 2003 ～ 2006.12

ꏅ 추진실적

○ 전주시 설계자문회의(기타발주 입찰방식 결정) -- 2003.03

○ 기본 및 실시설계중(진도 60%) -------------- 2003.08

○ 관계전문가 자문(전주시 자문위원 전문가 9명) ---- 2004.06

ꏅ 이후계획

○ 슬러지처리 분야 국내 전문가 자문 , 실태분석 공법결정 및

설계완료 ----------------------------------- 2004.10

○ 착공 --------------------------------------- 2004.12

○ 준공 --------------------------------------- 2006.12

화산․덕진처리구역 하수관거 정비사업

급격한 도시확장 인구증가 우․오수 미분리 불명수 유입 등으로

하수량이 매년 증가되어 하수처리장 증설요인을 제공하므로서,

증설에 따른 막대한 예산이 소요되는바 근본적 원인을 제거하기

위하여 하수도 정책을 우․오수 분리사업으로 전환(환경부정책)

ꏅ 총사업계획

○ 위    치 : 화산처리구역 1․4․7분구, 덕진처리구역 1분구

○ 사업규모 : 관거정비 70㎞

○ 사 업 비 : 37,390백만원(양 18,695.   시 18,695)

※ 2004예산 : 4,304백만원

○ 사업기간 : 2004.03 ～ 2008.12

ꏅ 추진실적

○ 기본 및 실시설계 완료 ----------------------- 2003.09

○ 공사발주 의뢰(조달청) ----------------------- 2003.12

○ 시공업체선정(조달청) 및 착공 ---------------- 2004.04

ꏅ 이후계획

○ 관련 주민 사업설명회 개최 ------------------- 2004.06

○ 1차년도(이월예산)분 공사완료 ---------------- 2004.12

- 화산7분구(민원 및 오수유입이 많은 동서학동 산성천주변) L=3.9㎞

○ 2차년도(현년도 예산)분 공사완료 ------------- 2005.12

- 덕진 1분구(대학병원 주변)  L= 3.8㎞

농촌마을 하수도 정비사업

농촌동 마을하수도가 적정 처리되지 않고 직접 방류되므로 하천

수질오염이 가중되어 연차적으로 마을하수도 시설을 정비하여

수질오염 방지

ꏅ 사업계획

○ 위    치 : 전주시 관내 농촌마을

○ 사업규모 : 마을단위 소규모 하수처리시설(50톤/일～500톤/일)

※ 70개 마을중에서 대상지 선정 추진

○ 사업기간 : 2004～2020(17개년)

○ 1단계사업

- 대    상 : 3개 마을

- 규    모 : 190톤/일

- 사 업 비 : 2,272백만원(2004년 예산 : 376백만원-용역비)

- 사업기간 : 2004 ～ 2006(3개년)

ꏅ 추진실적

○ 실태조사(구청, 동) ------------------------- 2004.04～05

- 해당동 39개마을 신청

○ 현지확인(39개마을) 및 검토 ---------------- 2004.06

- 하수종말처리장 유입가능 여부, 지형적 조건, 취락형태,

하수발생량 등 검토

ꏅ 이후계획

○ 실태조사 및 현지확인 결과 3～5개마을 선정 -- 2004.07

- 선정마을중 시가화 예정 등 감안 사업 우선순위 결정

○ 용역과제 심의 ----------------------------- 2004.09

○ 기본계획 및 실시설계 용역 ----------------- 2004.09～12

금암동주변 하수관거 정비사업

기존 하수관거 단면 부족으로 약간의 집중 호우시에도 도로 및

주택이 상습적으로 침수되어 이를 해소하기 위함

ꏅ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 금암동 일원

○ 사업규모 : 하수도시설  L=3.27㎞

○ 총사업비 : 3,327백만원(양 1,631.   시 1,696)

※ 2004년 예산 : 422백만원(양 261. 시 161)

○ 사업기간 : 2002.12 ～ 2004.12

ꏅ 추진실적(공정 52%)

○ 착  공 ------------------------------------ 2002.12

○ 고속버스터미널 부근(여울길) 압입추진 -------- 2003.07～11

- L=85m 3열(우수 2,700㎜ 1열.  오수 500㎜ 2열)

○ 여울길～시외버스터미널 뒤 PC Box 설치 및 오수관 매설 - 2003.10～2004.01

- L=1.47㎞(우수Box 3.0m×1.5m.  오수 500㎜ 2열)

※ 현재 공사 일시중지중 : 지하매설물(KT) 이설 협의중으로

10월중 이설가능

ꏅ 이후계획

○ 기린로～금암초등학교 PC Box 매설 및 준공 --- 2004.12

삼천 자연형하천 조성사업

삼천의 오염된 수질을 정화하고 훼손된 식생대를 보완하여 살아있는

생태계로 복원시켜 쾌적한 수변의 녹지공간 및 친수공간을 충분히

확보하여 시민들에게 제공함으로서 정서함양에 기여

ꏚ 사업개요

○ 위치(구간) : 완산구 삼천동 삼천교 ～ 추천대교

○ 사업규모 : 8.05㎞

○ 사 업 비 : 9,819백만원(양여금6,027.   시비3,792)

○ 사업기간 : 2000 ～ 2005(6개년)

ꏚ 추진실적(공정 67.0%)

○ 공사착공 ------------------------------------- 2001.12

○ 차집관로 매설(세내교～이수보1,934m) -------- 2002.09

○ 낙차공개량 및 어도설치(3개소) --------------- 2003.07

○ 수질정화습지 2개소(1개소 완료) -------------- 2004.07

○ 자전거도로(삼천교～이수보 1,700m) ---------- 2004.07

○ 저수호안(자연석쌓기 2,834m) ---------------  2004.12

ꏚ 이후계획

○ 자전거 도로개설 : 14.2㎞

- 우안 : 7.2㎞ ------------------------------- 2004.12

- 좌안 : 7.0㎞ ------------------------------- 2005.12

○ 수질정화습지(1개소) ------------------------- 2005.12

○ 기타(수제 및 여울, 징검다리, 조경) ----------- 2005.10

만경강 생태하천 가꾸기사업

전주천,삼천,만경강에 이르는 『전국에서 가장 깨끗한 하천

가꾸기사업』을 지속적으로 추진하여 건강한 녹색복지도시

건설 및 새만금 수질개선에 기여.

ꏚ 사업개요

○ 위  치(구간)

- 전주천 : 덕진구 팔복동 추천대교 ～ 만경강 합류부(5.7㎞)

- 만경강 : 완주군 삼례읍 하리교 ～ 삼례읍 삼례교(2.2㎞)

○ 사업규모 : 7.9㎞

○ 사 업 비 : 16,637백만원(국비10,257.양여금515.도비598.시비5,267)

○ 사업기간 : 2001 ～ 2010년(10개년)

ꏚ 추진실적(공정 9%)

○ 일반하천 개수사업(조경석 호안쌓기):1,858m -- 2002～ 2003.12

○ 실시설계 완료(사전환경성 검토서 포함) ------ 2003.09

○ 익산지방국토관리청 협의(비관리청사업 인가) ----- 2004.03

○ 전주시설계자문회의 자문 이행 --------------- 2004.06

ꏚ 이후계획

○ 국고보조사업으로 예산확보 상황에 따라 연차적 추진

- 자전거도로 연결 완료(13,270m) --------- 2004～2007

※ 추천대교 우안 ～ 송천동 한양아파트 ---- 2004.12월

- 저수호안 조경석쌓기(2,807m) ----------- 2006.

- 오염하천정화사업(1식) ------------------ 2005～2009

○ 공사 완공 ------------------------------- 2010.

재난 방재 업무추진

ꏅ 재난방재 현황

○ 재난관리대상시설 지정현황

- 2004.06.현재

구 분	총 계	중점관관리대상시설				재난위험시설
		소계	A등급	B등급	C등급	소계	D등급	E등급
합 계	1,211	1,197	1,084	74	39	14	14	0
건축물	1,182	1,169	1,075	62	32	13	13	0
시설물	29	28	9	12	7	1	1	0

○ 재난․재해기금 관리 현황

- 2004.06 현재                                     (단위:백만원)

구 분	법정액	확보액	미확보액	사용액	사용잔액 (이자포함)
재난관리기금	1,330	1,330	0	103	1,329
재해대책기금	5,923	5,027	896	603	4,778

○ 예산집행

- 재해대책기금 : 65백만원

※ 재해사전대비 점검결과 위험지역 해소사업(3개소)

ꏅ 이후계획

○ 재난관리대상시설 안전점검 실시

- 중점관리대상시설(A,B,C 등급) 1197개소(동) : 연2회

- 재난위험시설(D,E 등급) 14개소(동) : 월1회

※ 상반기 재난관리대상시설 점검결과에 의거 재난위험시설          신규․폐지 및 등급 조정 후 지정 고시

도시발전기획단 소관

ꊱ	전주서부 신시가지 도시개발사업----------	60
ꊲ	연초제조창 부지 활용방안 ----------------	61
ꊳ	35사단 이전 --------------------------	62

전주서부신시가지 도시개발사업

◦ 전주시의 장기발전을 위한 도시공간 구조 개편

◦ 전북도의 경제,사회,문화,행정등 중심기능을 담당할 중핵 도시건설

◦ 전통문화와 최첨단 지원시설이 조화된 미래형 신시가지조성

ꏅ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 효자동 일원

○ 규    모 : 87만평

○ 사 업 비 : 4,185억원

○ 사업기간 : 1999 ～ 2006(8개년)

○ 사업방식 : 도시개발법에 의한 도시개발사업(환지＋수용)

ꏅ 추진실적

○ 편입 토지 및 지장물 보상

- 대 상 : 2,564건  85,500백만원

- 실 적 : 1,696건  68,552백만원(80.2%)

○ 체비지 매각 : 278필지 / 2,653억원(금액대비 66.7%)

- 공 개 : 268건 2,260억원

- 수 의 :  10건   393억원(공공 및 일반업무용지)

○ 1․2차 공사 추진   ------------------------- 공정 13%

- 경찰청주변 기반시설 완료

- 삼천2교(도청옆) 기초 및 교대 콘크리트 타설 완료

- 도청주변 간선도로 3개노선 도로 개설 성토작업

- 마전마을앞 쓰레기 처리를 위한 쉬트파일 박기작업 완료

- 문화재 시굴을 위한 벌목작업 완료

ꏅ 이후계획

○ 문화재 시굴 및 발굴조사 완료 ---------------- 2004.12

○ 토지․지장물 등 보상 완료  ------------------ 2004.12

○ 전기 및 조경공사 발주   --------------------- 2005.02

연초제조창부지 활용방안

연초제조창 주변지역의 난개발 방지와 시민휴식, 문화공간조성 및

구도심 활성화 도모를 위한 계획적이며 합리적인 토지 이용방안 수립

ꏅ 현    황

○ 부지면적 : 71,050㎡(21,493평), 제2종일반주거지역

○ 시설규모 : 연면적 110,179㎡(33,329평), 제조기계 등

○ 폐창일자 : 2002.06.18

ꏅ 추진실적

○ 연초제조창부지 토지이용계획(안) 수용여부 공문발송 -- 2004.02.04

계	공동주택부지	문화복합부지	공원부지 (기부채납)	도로부지 (기부채납)	잔여지
71,050㎡ (21,493평)	46,500㎡ (14,066평)	5,000㎡ (1,513평)	17,450㎡ (5,279평)	1,870㎡ (566평)	230㎡ (69평)

○ 연초제조창부지 활용방안에 대한 의견회신(KT&G) -- 2004.04.23

- 용적율 완화 범위내에서 15층이상 고층화 및 공원 3개소 배치 요구

○ 연초제조창부지 활용방안 KT&G 회신사항 의견제시 -- 2004.05.17

- 공원 기부채납면적 축소 및 고층화 불가와 공원 2개소 이내

배치방안 검토

○ 연초제조창부지 활용방안에 대한 의견 회신(KT&G) -- 2004.06.14

- 기부채납 면적이 과다 경영여건상 수용 어려워 부지 개발제안

등을 통한 다각적인 사업성 검토 결과에 따라 재협의 계획

○ 연초제조창부지 활용방안 KT&G 방문협의 ----- 2004.06.18

- 구체적인 재 협상안 조속 제시 요구

ꏅ 이후계획

○ KT&G측 재협의 검토 후 7월중 협약추진

35사단 이전

53년 창설된 향토사단은 전주시 북부권의 중심축에 위치하여 도시의

기형적 팽창을 불가피하게 하는 등 전주 북부권 발전을 가로막고 있어

정부의 신행정수도 이전에 맞춰 부대이전을 완료해야 함

ꏅ 사업개요

○ 현 35사단 부지 : 부지면적  35만평, 건축면적 1만5천평

○ 이전 후보지    : 부지면적 157만평, 건축면적 4만3천평

- 병영 및 기본훈련장(98만평) : 완주군 구이면 평촌리 일원

- 공용화기 사격장(59만평)    : 임실군 신덕면 조월리 일원

※ 송천동 비행장(96천평)은 이전계획 미수립

ꏅ 추진실적

○ 1991.06.29 : 사단이전 건의안제출(시의회 ⇨ 국방부 )

○ 1995.02.07 : 사단이전 촉구 청원(전북도의회 ⇨ 국회 )

○ 1999.04.15 : 이전후보지(7개소)조사및 분석의뢰(시 ⇨ 35사단)

○ 2002.08.16 : 기부대양여방식에 의한 국방부 이전협의 승인

○ 2002.10.18～2004.02.04 : 5차 실무추진위원회 개최

- 이전규모 합의 : 부지면적 150여만평, 건축면적 4만3천평

○ 2004.03.12 : 협약체결 요청(35사단 ⇨ 전주시)

- 이전 후보지 선정 통보

○ 2004.03.23 : 이전부지 해당지자체 협의(전주시 ⇨ 완주․임실군)

○ 2004.05.11 : 완주군 재협의

ꏅ 추진 애로사항

○ 35사단 이전예정 부지중 직사공용화기 및 박격포사격훈련장

59만평을 별도로 확보하기가 곤란함

- 임실지역으로 이전코자 하나 임실군과 지역주민 반대입장 표명

○ 병영 및 기본훈련장 부지 98만평에 대해서는 완주군 구이면

주민이 반대하고 있으며, 완주군도 명확한 입장표명 유보

- 구체적인 사업계획이 수립되지 않아 주민설명회 등 사전 절차를

진행하지 못한 관계로 이해부족에서 반대하고 있다고 판단됨

○ 우리시와 35사단 측과의 5차례의 실무회의를 거쳐 협약체결

단계에 있으나, 정식 협약체결은 아직 못하고 있음

- 해당 지자체와의 협의과정을 거치지 않고 협약을 체결할 경우

사전설명 절차 결여 등을 이유로 강한 반대가 우려되어 다소

시간이 소요 되더라도 협약체결을 위한 협의 계속중임

	【 이전부지 해당 지자체 의견 】
➲ 완주군 : 지역주민들이 진정서를 제출 하는 등 반대하고 있어 구이면민의 정서를 고려하여 충분한 의견 수렴 후 가능 (구이면민은 반대 현수막 게첨, 진정서제출 등 반대) ➲ 임실군 : 사격장만 이전은 반대하나 부대 전체를 임실군으로 이전시 적극 협조(범군민 유치추진위원회 구성)

ꏅ 이후계획

○ 이전 부지 해당 지자체와 협의(전주시 ⇔ 완주․임실군)

○ 이전 합의각서“안” 체결(전주시 ⇔ 35사단)

○ 이전 합의각서“안” 승인(국방부 ⇒ 35사단)

○ 사업시행자 지정 승인(국방부 ⇒ 전주시)

환경사업소

ꊱ	맑은 하천 가꾸기 적극 추진 --------------	65
ꊲ	위생처리능력 배가 증진 ------------------	66
ꊳ	하수처리과정 시민공개--------------------	67
ꊴ	현업부서직원 사기 앙양 ------------------	68

맑은하천 가꾸기 적극추진

○ 차집관로의 철저한 관리로 전주천과 만경강등 수질보전

○ 신속하고 정확한 공정별 수질분석으로 하수처리효율 극대화

○ 지속적인 유입하수 및 방류수질 관리로 하천오염 방지도모

ꏅ 현 황

○ 차집관거 : 5개 노선 44.8㎞(전주․삼․금암천, 아중․팔복선)

○ 시    설 : 맨홀 507개소, 우수토실 174개소, 환기구 53개소

○ 관리인원 : 5명(기능 1. 일용 4)  차량1대(봉고차)

○ 수 분 석 : 생활하수 등 21개 공정(BOD 등 14개 항목)

○ 슬러지분석 : 소화조 등 14개소(TS외 3개 항목)

○ 타공정 수질분석 : 공장폐수 등 21개소(BOD외 8개 항목)

ꏅ 추진실적

○ 차집관로 우수토실 개량공사(착공 : 2004.06월하순)

- 우수토실 10개소(D=300～800㎜  L=512m) 143백만원

○ 상반기 차집관로 준설공사(착공 : 2004.06월하순)

-  팔복공단라인 외3개소(L=1,507m Q=239㎥) 30백만원

○ 하천방류수질 분석                            (단위 : ㎎/ℓ)

구 분	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
수질기준	10	40	10	20	2	3,000개/㎖
처리실적	15.8	26.5	15.7	17.177	1.308	2,400

ꏅ 이후계획

○ 차집관로 지속적인 일일순찰 및 개량공사, 준설공사 마무리

○ 시간대 및 계절별 수질변화 지속관리

위생처리 능력 배가 증진

○ 일일 반입량 당일 24시간 운전으로 당일 소화처리

○ 철저한 예방점검으로 고장 없는 위생처리장 운영

ꏅ 현    황

○ 1일 처리  능력   ⇒  290㎘

○ 1일 평균 반입량  ⇒  400㎘

○ 수집 운반 차량   ⇒  15개사 45대(분뇨:4대  정화오니:41대)

ꏅ 추진실적

○ 일일 반입량 당일 소화로 처리효율 극대화

- 6월말현재 반입량 : 10,387대 74,438㎘(전년도 대비 93%)

- 1일 평균 반입량  :     57대    409㎘(14시간 운전)

○ 집중 반입 대비 지하 저류조 최대 공간 확보

- 1일 최대반입량 : 984㎘(2004.05.12)

○ 년중 무휴 반입체제 실시

- 휴일반입 : 465대  2,418㎘

○ 자유시간대 반입(17:00～07:00)

- 조기반입 : 64일  109건(반입량의 35%)

ꏅ 이후계획

○ 24시간 연속운전으로 처리능력 증진

○ 점검 정비 철저로 고장없는 위생처리장 운영

○ 연중무휴 반입체제 지속유지

하수처리과정 시민공개

○ 환경기초시설에 대한 지속적인 시민 홍보를 통한 환경보전의식 함양

○ 합성세제, 생활오수 줄이기 및 하수처리의 중요성 제고

ꏅ 현  황

○ 1일 처리능력 : 303,000㎥(1단계 103,000㎥.  2단계 200,000㎥)

○ 1일 처리량   : 290,825㎥

※ 2003년도 홍보실적 : 6,687명

ꏅ 추진실적

○ 하수처리과정 견학 : 2,076명

- 유치원 1,451명   학생 250명   기타 375명

○ 홍보관련 안내문 발송 : 1회(470개소)

- 사회단체 30개소  학교 73개소  유치원 및 어린이집  304개소

○ 최종방류수 수질검사 결과 매일공개 : 5개항목

ꏅ 이후계획

○ 내실 있는 환경체험 교육프로그램 운영

○ 홍보영상물 상영(VTR) : 환경의식 제고

○ 하수처리과정 연중 시민공개

- 물의 중요성을 인식하고 환경보전의 생활화 유도

- 생생한 교육적 체험으로 수질오염을 사전 예방

- 주부 등 일반인의 적극참여 유도

현업부서 직원 사기앙양

악취, 소음발생 등 열악한 환경에서 근무하는 직원들의 사기를

진작시키고 근무의욕 고취로 화합하는 직장분위기 조성.

ꏅ 현 황

○ 현업부서 근무 : 38명(관리, 위생, 하수, 실험)

○ 근무환경

- 탈수실, 유입침사지, 위생처리장 ⇒ 황화수소, 암모니아가스 발생

- 송풍기실, 위생처리장 ⇒ 소음발생

ꏅ 추진실적

○ 체력단련시설 조성 및 체육용품 구입

- 배드민턴장 설치 : 1개소(테니스장옆 공간 20ｍ×16ｍ)

- 체육용품 구입   : 배드민턴 라켓 외 8종

○ 열악한 근무환경 개선

- 사업소주변 하천 꽃길조성 : 영산홍 3,000주, 무궁화 300주 식재

○ 직원극기훈련 실시 : 1회

○ 직원 능력개발비 지급 : 1인

ꏅ 이후계획

○ 근무의욕 고취와 동기부여로 원만한 직장분위기 조성

○ 직원간 화합하는 분위기 조성으로 업무수행능력 향상

차량등록사업소 소관

ꊱ	시민이 만족하는 친절봉사 행정 구현 ------	70
ꊲ	자동차․건설기계등록원부 발급기관 확대 -	71
ꊳ	자동차 정기검사일 인터넷 조회 서비스 ----	72
ꊴ	건설기계 등록이전 처리기간 단축 ---------	73
ꊵ	자동차․건설기계 양도증명서 교부방법 개선 ---	74

시민이 만족하는 친절봉사 행정구현

친절봉사 생활화로 민원인 편의를 도모하고 민원행정의 투명성 및

신뢰성을 확보하여 시민이 만족하는 수요자 중심의 행정구현

ꏚ 개  요

○ 자동차 등록대수(2004.06월 현재) : 192,691대

○ 민원처리건수 : 483,075건(1일평균 3,264건)

ꏚ 추진실적

○ 안내 도우미 배치로 신속한 민원처리

- 신청서 작성, 구비서류 검토, 민원처리 안내 서비스 등

․ 청경 및 자원봉사자 배치 : 1일 2명/ 연 560명

○ 장애인 등록업무 대행창구 개설운영

- 3급이하 장애인 및 노약자 등록업무 대행

○ DID전화 증설로 전화민원 불편해소(2004.03월 완료)

- DID전화 10회선 증설 : 7회선 → 17회선

- 담당자별 전용회선 설치로 민원인과 직접대화 및 안내

○ 자동차 등록원부 발급기관 확대(2004.01월부터)

- 민원행정시스템과 연계 시․구․동사무소에서 직접발급

○ 민원인을 위한 편의시설 설치

- 안내간판 설치(2개), 노후 복사기 교체(1대), 인터넷 PC(2대),

민원인 탁자 설치(2개)

ꏚ 이후계획

○ 민원편의 시설 확충 - 민원대기 순번기 추가설치

○ 지속적인 창구직원 교육으로 친절한 대민서비스 추진

자동차․건설기계등록원부 발급기관 확대

자동차 및 건설기계 등록원부를 민원행정시스템과 연계 시․구

․동사무소 에서도 확대 발급함으로서 기존 팩스민원 처리의

불편해소 및 민원 대기시간 단축

ꏚ 개  요

○  등록원부 발급기관 확대

- 2003년도까지 : 차량등록사업소에서 직접 발급하거나 구청․

동사무소에서 FAX민원으로 신청 발급

- 2004년부터 : 민원행정시스템과 연계 시․구․동사무소

에서도 확대 발급 시행

ꏚ 추진실적

○ 차량등록사업소 방문민원 및 다량신청민원은 종전대로 차량등록

사업소에서 발급

- 등록원부 발급현황(2004.06월) : 67,224건(1일평균 448건)

․ 자동차등록원부   : 64,410건

․ 건설기계등록원부 :  2,814건

○ 2004년01월부터 시․구․동사무소에서 등록원부 발급 시행

- 등록원부 발급실적 증가 : 2003년도 대비 약3배 증가

․ 2003년도 FAX민원 월평균 645건

․ 2004년도 월평균 2,000건(43개소)

ꏚ 이후계획

○ 등록원부 발급기관 확대시행에 대한 대민홍보 적극추진

자동차 정기검사일 인터넷 조회 서비스

자동차 정기검사일을 시 홈페이지에서 등록번호 입력만으로 상시

확인 할 수 있게 하여 안방 민원 서비스 실현

ꏅ 현 황

○ 자동차 등록 대수 : 192,691대(2004.06월 현재)

○ 연간 검사 대상수 : 약 120,000대

※ 자동차 검사주기 : 6월 ～ 4년(차종 및 차령에 따라 다름)

ꏅ 그간 검사안내 개선 사항

○ 2002년 이전 : 경과안내 우편 1회 발송(법적사항)

○ 2003년 이후 : 경과안내 우편 2회로 늘여 발송

- 우편물 반송자 전화 안내 및 주민전산망 활용 현 거주지로 2차 안내

※ 검사 사전안내는 교통안전공단에서 1회 발송(만료 30일전)

ꏅ 추진실적

○ 시 홈페이지에 자동차 정기검사일 조회 인터넷 서비스 실시

- 자동차 등록번호 입력으로 자동차검사일 검색

※ 검색방법 : 시 홈페이지 에서

자동차검사일 검색 (배너 클릭)	➩	자동차번호 (입력)	전북○가○○○○	➩	조 회

ꏅ 이후계획

○ 자동차정기검사일 인터텟 조회 서비스에 관한 홍보활동 강화

- “더불어사는 전주” 게재 및 반상회 개최시 홍보 협조의뢰

건설기계 등록이전 처리기간 단축

타 시ㆍ군에서 등록 이전시 처리기간을 단축하여 이전에 따른

건설기계의 유휴일자를 줄여 시민 편익중심 행정 구현

ꏅ 등록이전 개요

○ 법적 처리기간		관 내 : 즉시
		관 외 : 20일

○ 관외 등록이전 평균소요 기간 : 15일

※ 처리계통도

	송부요청		원부송부
접 수	ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꋼ	타시ㆍ군	ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꋼ	등록완료
	5일		10일

ꏅ 추진실적

○ 목 표 : 평균 처리기간 15일 ⇒ 10일로 단축

○ 실 적 : 평균 처리기간 9.4일

- 관외 등록이전 처리건수(2004.06월현재) : 334건

- 등록원부 등 관련서류 송부 요청시 스캐너를 이용 전자문서로당일 송부 요청하여 처리기간 단축

ꏅ 이후계획

○ 지속 추진으로 시민 편익증진 및 당사자 영업손실 최소화

○ 전산처리만으로 이전 가능토록 관계법령 개선 건의(건교부)

자동차․건설기계 양도증명서 교부방법 개선

등록이전시 2회 방문하여야 처리되는 제도를 양도증명서 교부

방법 개선으로 1회 방문 처리토록 대시민 서비스 강화

ꏅ 현  황

○ 자동차  이전등록대수(2004.06월)  : 20,470대

○ 건설기계 이전등록대수(2004.06월) :    553대

ꏅ 추진실적

○ 자동차 양도증명서(서식) 교부장소 확대

- 차량등록사업소 1개소 ➩ 시․구․동 민원실 43개소로 확대

․ 시․구․동 민원실에 서식 비치 및 교부

○ 인터넷(시청 홈페이지)을 활용한 서식 다운로드 방법 홍보

․ 시․구․동 민원실 43개소에 안내문 게시 협조의뢰

※ 서식 다운로드 방법

- 시청 홈페이지 ➩ 차량등록사업소 ➩ 서식다운로드 ➩ 서식 출력

○ 건설기계 양도증명서(서식) 교부방법 개선

- 대여회사 47개소에 양도증명서 서식을 일정량(10매) 교부하고

이전 신청시 제출되는 양도증명서 매수만큼 추가 교부

※ 건설기계 양도증명서 교부시 소유자 인적사항 기재후 교부(건교부 지침)

ꏅ 이후계획

○ 자동차 양도증명서 교부장소 확대 및 인터넷(시청홈페이지)을

활용한 서식 다운로드 방법 등 홍보강화 --- 민원불편 해소