제224회 전주시의회 제1차 정례회

도 시 건 설 위 원 회

2005년도

주요업무 추진상황 보고

상수도사업소

목       차

ꏚ 일 반 현 황	...	3
ꏚ 상수도공기업 예산	...	9
ꏚ 2005년도 추진 목표	...	10
ꏚ 주요추진업무	...	11

일 반 현 황

ꏅ 자체 상수도시설 변천과정

○ 1924. 3. 상관정수장 신설 (시설용량 1,660㎥/일)

→ 62. 5월 1차 확장 → 72. 7월 2차 확장 → 74. 5월 3차확장

→ 84. 8월 4차 개량(20,000㎥/일) → 1997. 10월 생산중지

○ 1924. 3. 완산정수장 신설 (시설용량 1,800㎥/일)

→ 40. 5월 1차 확장 → 70. 10월 2차 확장(8,500㎥/일) → 86. 5 폐쇄

○ 1940. 5. 서학보조수원지 신설 (취수량 300㎥/일)

→ 62. 6월 1차 확장 → 69. 6월 2차 확장(8,500㎥/일) → 86. 5 폐쇄

○ 1943. 7. 상관저수지 축조 (저수량 1,347,000㎥)

→ 62. 5월 저수지 확장(2,139,000㎥)

○ 1969. 12. 팔복정수장 신설 (고산수계 생활 및 공업용수 시설용량 35,000㎥/일)

→ 89. 9월 생활용수 폐쇄 → 89. 12월 공업용수 확장(70,000㎥/일)

○ 1975. 10. 대성정수장 신설 (섬진강수계  시설용량 40,000㎥/일)

○ 1979.  8. 원당양수장 신설 (취수량 25,000㎥/일, 대성보조수원)

○ 1982.  8. 지곡정수장 신설 (삼천수계 시설용량 20,000㎥/일)

→ 2002. 3. 지곡정수장 생산중지 (전주권 광역 급수구역 편입)

ꏅ 광역상수도 수수현황

○ 1985.  2. 금강광역상수도   수수           (배분량 102,000㎥/일)

○ 1996. 10. 섬진강광역상수도 수수           (배분량  40,000㎥/일)

○ 1998.  2. 전주권광역상수도 1단계 1차수수  (배분량 105,000㎥/일)

○ 2002.  2. 섬진강광역상수도 수수중지

○ 2002.  2. 전주권광역상수도 1단계 2차수수 (배분량 113,000㎥/일)

○ 2003.  2. 금강광역상수도 수계 전주권 광역상수도 전환

ꏅ 기구변천 과정

○ 1922.  7.  건설과내 수도계 신설

○ 1961.  1.  수도과 승격(1과 5계)

○ 1979.  5.  수도국 승격(1국 2과 5계)

○ 1986. 10.  급수과내 누수방지계 신설

○ 1988.  7.  상수도관리사업소 신설(1소 3계)

○ 1989.  5.  완산,덕진구청 수도과 신설(2과 6계)

○ 1990.  9.  상하수도국을 건설국으로 기구개편 업무과와 급수과를

수도과로 통폐합

○ 1997.  3.  본청, 사업소, 구청등 분산 기구가 통합된 상수도사업소로

발족(상수도행정 일원화)

○ 2001.  1. 업무과를 수도행정과로, 운영과를 수질관리과로 개편

○ 2003.  1.  수도행정과 완산요금․덕진요금담당을 요금․징수담당으로 개편

○ 2004.  1.  수도행정과 업무․요금․징수담당을 상수도공기업․검침부과․

체납징수담당으로 급수과 시설담당을 수도시설담당으로

수질관리과 관리․검사․보수담당을 사업장관리․수질분석․

상수도생산담당으로 개편

ꏅ 기구 및 인력

○ 기    구  -  1소 3과 10담당(16사업장 2센타 1전산실)

																														소 장
					수도행정과																															급 수 과																												수질관리과
	상수도공기업								검 침 부과						체납징수							계량기관리															급수							수도시설							누수관리														사업장관리							수질분석										상수도생산
		전산실					계량기시험소							누수방지센타						방수리취수장				삼천취수장							원당취수장				전미취수장							상관수원지							대성정수장				지곡정수장			팔복정수장			인후배수지		천마배수지				효자배수지			완산배수지				송천배수지				서신배수지						금암배수지		화산배수지

※ 가압장 15개소

○ 인   력                                            (2005.6.30현재)

부서 직급		정원	현 원
			계	수도행정과	급 수 과	수질관리과
합계		91	92(1)	33	22	37(1)
일반직	소계	43	43(1)	15	11	17(1)
	4급	1	1	1
	5급	3	3	1	1	1
	6급	10	10	4	3	3
	7급	16	24	9	4	11
	8~9급	13	5(1)	-	3	2(1)
연 구 사		4	4			4
기 능 직		44	45	18	11	16

※ (1)은 2004. 9. 18. 시 환경청소과 파견근무(기계8급 임춘호)

※ 청경 20명, 상근인력26명(300일:15명 280일:11명)

ꏅ 급 수 인 구

총인구	급수인구	보급율 (%)	1일 1인 급수량(ℓ)	급수전	유 효 율		누수율 (%)
					유수율(%)	무수율(%)
명 624,260	명 605,840	97.05	411	176,509	61.5	20.29	18.29

ꏅ 수계별 생산 및 급수구역

구 분			시설용량 (천㎥/일)	평상시 (천㎥/일)	급 수 지 역	급수인구	비율 (%)
총 계			388	292		605,840	100
생활용수	합 계		318	240	40개동	605,840	100
	자체상수도	소 계	60	42	8개동	99,077	16.4
		대 성	40	42	동, 서서학, 중화산1, 평화1,2 동, 서완산, 효자1,	99,077 (8개동)	16.4
		지 곡	20	-	일 시 중 지
		상 관	-	-	대성수계 보충용
	광역상수도	전주권	258	198	중앙,풍남,태평,중노1.2, 교동,남노,서신,삼천1,2,3 중화2,평화1.2,효자2.3.4, 서노송,진북1.2,인후1.2.3, 금암1.2, 덕진, 우아1.2,호성 덕진, 팔복, 송천1.2동, 조촌 동산.	506,763	83.6
공업 용수	팔복정수장		70	52	팔복동 1, 2공단

※ 생활용수 급수구역은 생산량 및 수요량에 따라 조절

ꏅ 송․배․급수관

단위 : ㎞

총 연 장	송 수 관	배 수 관	급 수 관	비 고
2,018	70	615	1,333

ꏅ 배수지 용량

구 분	배수지(개소)	시설용량(㎥)	비 고
계	10	113,600
	대 성	8,600
자체상수도	지 곡	1,000	생산중단
	완 산	1,000
	인 후	30,000
	천 마	30,000
광역상수도	효 자	15,000
	송 천	7,000	일시중단
	서 신	7,000	가동중단
	금 암	7,000	가동중단
	화 산	7,000	가동중단

※공업용수 배수지  -----------------11,600㎥

ꏅ 상수원 보호구역

상수도사업장	보 호 구 역			구역지정일	보호시설
	면적(㎢)	상류(Km)	하류(Km)		안내판	표주
계	26.96				42	132
방수리취수장	0.27	1.0	0.5	72. 5. 5.	7	24
상관수원지	25.99 (마치12.00 의암13.99)	전유역		24. 6. 9.	10	26
삼천취수장	0.28	2.2 (독배천0.7)	0.3	82. 6.19.	9	42
원당양수장	0.10	1.0	0.1	80. 8. 4.	6	16
전미취수장	0.32	0.5	0.3	67. 8. 5.	8	24

ꏅ 상수원 수계별 『댐』 저수량

수 원	위 치	만수량(천㎥)	관리기관	비 고
계		817,139
상 관 제	완 주 군	2,139	전 주 시	대성수계보충
용 담 댐	진 안 군	815,000	수자원공사	전주권광역

상수도공기업예산

총 규 모 : 56,200백만원

(2005년 1회추경 2,134백만원 증)       (단위 : 백만원)

세 입			세 출
계 - 56,200(100%)			계 - 56,200(100%)
○ 상수도사업수익 - 48,244(85.9%)			○ 상수도사업비용 - 47,803(85.1%)
◦ 영업수익 : ․ 급 수 수 익 : ․ 급수공사수익 : ․ 기타영업수익 : ◦ 영업외수익 : ․ 예금수입이자 : ․ 타회계전입금 : ․ 기타영업외수익 :	46,541 44,229 1,857 455 1,702 305 1,260 138		◦ 인 건 비 : ◦ 물 건 비 : ◦ 이전경비 : ◦ 급수공사비 : ◦ 지급이자 : ◦ 예 비 비 :	4,772 37,881 2,047 1,252 1,526 323
○ 자 본 적 수 익 - 1,934(3.4%)			○ 자본비용 - 8,397(14.9%)
◦ 고정부채수익 : ◦ 자본잉여금수익 : ○ 예 산 외 계 정 - (과년도계정)	1,500 434 6,022(10.7%)		◦ 자본투자비 : ◦ 부채상환금 : ◦ 예 비 비 :	2,873 5,281 242

2005년도 추진 목표

전국에서 가장 풍부하고 깨끗한 맑은물 공급

	추 진 계 획
◦풍부하고 깨끗한 수돗물 공급 ◦시민이 만족하는 상수도 행정 ◦경영의 내실화로 자립기반 구축

⇩

ꏅ 2005년 중점실천과제

◦ 풍부하고 깨끗한 수돗물 공급

- 단수없는 수돗물 공급

◦ 시민이 만족하는 상수도 행정

- 시민이 직접참여하는 수요자중심의 서비스 제공

◦ 공기업경영 내실화로 생산원가 절감

- 효율적인 예산운용, 부채감축 등 경영개선 노력

※ 상수도운영 효율화사업 수공위탁 추진

주요업무추진

ꏅ 전주시 상수도운영 효율화사업 추진	...	12
ꏅ 전주권 광역상수도 1단계 3차수수사업	...	14
ꏅ 맑은물 공급 대책 사업	...	15
ꏅ 변방동 미급수지역 상수도 확대공급	...	16
ꏅ 간이 급수시설 유지관리	...	17
ꏅ 노후 및 고장계량기 교체	...	18
ꏅ 절 수 기 기 보 급 확 대	...	19
ꏅ 수질검사기관 운영의 활성화	...	20
ꏅ 상수도 수질검사의 선진화 추진	...	21
ꏅ 상수도사업장 유지관리	...	22
ꏅ 유 수 율 제 고 사 업 추 진	...	23
ꏅ 부 채 경 감 및 경 영 개 선	...	24

전주시 상수도운영 효율화사업 추진

○ 전문기관에 의한 수질 ․ 수량관리 ⇨ 최상의 수돗물공급

○ 유수율 향상 ⇨ 고효율 경영 및 요금인상 억제

○ 시설현대화  ⇨ 운영관리 과학화

○ 고객서비스 강화

ꏅ 사업개요

○ 기간 및 범위

- 사업기간 : 사업 개시일로부터 20～30년간

- 대상시설 : 수도시설 전체(취수에서 수도꼭지까지)

- 사업범위 : 시설개선. 운영관리. 고객․요금관리 및 부대업무

○ 수탁형태

- 시설소유 ⇨ 전주시. 시설운영 ⇨ 한국수자원공사

- 개․대체 등 신규취득자산  ⇨ 전주시에 귀속

○ 조직인원

- 전주시 상수도 종사직원의 안정된 고용 보장

※기본협약 체결(전주시, 수공) ----  2004. 10. 22

ꏅ 상반기 추진실적

○ 기초자료 수집 및 분석                   : 2005. 1월 완료(수공)

○ 사업진단(경영진단, 공급체계, 수처리공정, 설비시스템) : 2005. 3월 완료(수공)

○ 시설물 안전진단(17개소 시설)            : 2005. 5월 완료(수공)

○ 공정, 관망, 시설, 안전진단 및 개선방안 수립 : 2005. 6월 완료(수공)

ꏅ 하반기 추진 계획

○전주시상수도 효율화사업계획 수립 및 협의조정 : 2005. 7중(전주시, 수공)

○ 사업계획서 검토 (전문기관의 타당성 용역)       : 2005. 9월까지(전주시)

○ 설문조사 및 시민단체 공청회(주민설명회)  : 2005. 10월중(전주시)

○ 시의회 위탁동의안 및 동의절차 이행        : 2005. 11월까지(전주시)

○ 실시 협약 체결                          : 2005. 12월까지(전주시,수공)

전주권 광역상수도 1단계 3차사업

○ 기존 금강계통 배수구역 급수체계를 용담댐 수계로 전환하여

안정적인 광역수 공급을 위한 상수도 기반시설 확충

ꏚ 사업개요

○ 사 업 량 : 팔복배수지건설 1개소 (V=30,000㎥)

송․배수관매설 L=11.4㎞(송수관5.3㎞,배수관6.1㎞)

○ 사 업 비 : 30,800백만원

○ 사업기간 : 2004. 12 ~ 2008. 12 (4개년)

ꏚ 상반기까지 추진실적

○ 실시설계 용역완료(2004. 12. 21)

○ 토지 및 지장물 보상

- 토    지 : 30필지 31,476㎡중 20필지 23,342㎡완료(67%)

- 지 장 물 : 13건중 7건 완료(54%)

- 보 상 비 : 1,365백만원중 955백만원 집행 완료

○ 송수관 설치 관련 협약체결(수공 금강 남부권지역본부장)--2005.2.1

○ 송수관 D600mm, L=2.9㎞ 시공중(수자원공사)-현공정5%

- 공 사 명 : 전주시 광역용수 송수관로 설치사업

- 사업개요 : D600㎜, L=2.9㎞(우림교～삼천취수장)

- 사업기간 : 2005. 4. 15 ～ 2006. 4. 14(1년간)

- 시 행 자 : 한국수자원공사 금강남부권지역본부

- 도 급 자 : (주)대아건설→80%, 원광종합(주) →20%

ꏚ 하반기 추진계획

○ 토지 및 지상물 보상(10필지 8,134㎡, 지장물 6건)

○ 송수관 D600mm, L=2.9㎞ 추진(수자원공사)

○ 사업량 : 배수지 1지(V=30,000㎥), 송․배수관(D=800～1,000mm), L=8.5㎞

○ 사업기간(사업비) : 2008.12까지(부족사업비 : 21,192백만원)

※ 연도별 사업 계획                            (단위 : 백만원)

사업개요	계	2004년까지	2005년	2006년 이후
사 업 량	배수지 : V=30,000㎥ 송배수관 L=11.4㎞	실시설계 및 토지 지장물 보상	토지 및 지장물 보상	배수지구조물 및 마무리
사 업 비	30,800	9,508	100	21,192

맑은 물 공급대책사업

○ 20년이상 노후 급․배수관 부설구간 및 적수발생 민원지역 우선 개량

○ 기대효과  - 누수율 저감 목표 18.0％ → 17.0％

ꏅ 사업개요

○ 사 업 량 : 828.9㎞ (급수관 607.9㎞  배수관 221.0㎞)

○ 사 업 비 : 60,888백만원(급수관 41,849  배수관 19,039)

○ 사업기간 : '92 ～ 2011년(20년)

○ 사업내용 : 노후급․배수관 교체 및 통합공사, 세관갱생공사

ꏚ 2004년까지 실적----------40.4%

○ 노후급수관 :   198㎞    8,758백만원

○ 노후배수관 : 137.1㎞   14,105백만원

ꏚ 2005년 추진계획

○ 사 업 량 : 14.98㎞ (급수관 9.1㎞  배수관 5.88㎞)

○ 사 업 비 : 1,807백만원(급수관 657  배수관 1,150)

○ 사업기간 : 2005. 1 ~ 12월

ꏅ 상반기추진실적

○ 사 업 량 : 6.3㎞ (급수관 3.6㎞  배수관 2.7㎞)

○ 사 업 비 : 647백만원 (급수관 187  배수관 460)

ꏅ 하반기 추진계획

○ 사 업 량 : 8.68㎞ (급수관 5.5㎞, 배수관 3.18㎞)

○ 사 업 비 : 1,160백만원 (급수관 470, 배수관 690)

ꏅ 2005년 이후 추진계획

○ 사 업 량 : 478.82㎞ (급수관 400.8㎞, 배수관 78.02㎞)

○ 사 업 비 : 36,218백만원 (급수관 32,434, 배수관 3,784)

ꏚ 2005년 노후배수관 개량계획

연번	사 업 명	사업규모	조 정 사업비	사업 구분	비고
계	본예산 7개소, 추경 4개소	D100～150 L=5,880m	1,150
1	서완산동 완산교 ~ 효자3 단지 앞 배수관 교체공사	D=150 L=500	100	노후관교체	설계중 8월중 발주
2	다가동 도청 앞 노후배수관 교체공사	D=150 L=530	106	노후관교체	도로굴착 심의중
3	용머리 길 PVC배수관 교체공사	D=150 L=900	180	PVC교체	설계중 7월중 발주
4	송천동 굿마트 노후배수관 세관갱생공사	D=150 L=700	140	세관갱생	완 공
5	서서학동 PE 배수관 교체 공사	D=150 L=450	81	PE관 교체	공사중
6	평화병원 앞 PVC 배수관 교체공사	D=100 L=400	72	PVC교체	완 공
7	팔복동 신상교회 부근 노후배수관 교체공사	D=100 L=600	61	노후관 교체	완 공
8	간접복구비		60
9	서노송동 노송교회부근 노후배수관교체공사(추경)	D=150 L=500	100	노후관교체	6월중 발주
10	금암동 금암초교부근 노후배수관교체공사(추경)	D=100 L=500	50	노후관교체	7월중 발주
11	태평동일대 구역계량사업(추경)	A=62ha	100	구역계량	7월중 발주
12	화전동 화전제 배수관이설공사(추경)	D=150 L=800	100	배수관이설	10월중 발주

단위 : 백만원

농촌동 미 급수지역 상수도확대 공급

○ 도시 및 산업화등으로 농촌동 자연부락의 지하수 수질이 오염되어

주민생활 불편과 보건위생을 위협하고 있어 수돗물공급지역 확대하여

시민의 보건위생 향상

ꏚ 사업개요

○ 총 68개소  L=120.0km  3,685세대(110개마을)

○ 사 업 비 : 14,000백만원

○ 추진기간 : ‘99 ～ 2007년

ꏚ 2004년까지 실적

○ 사 업 량 : 36개 노선  L=54.7km(45.6%)

○ 사 업 비 : 5,494백만원

○ 수혜인구 : 59마을  1,958세대

ꏚ 2005년 추진계획

○ 사 업 량 : 6개 노선 7개마을  L=5.75km

○ 사 업 비 : 800백만원

ꏚ 상반기 추진실적

○ 추진실적 : 3개 노선  L=3.3km완료

○ 사 업 비 : 450백만원

ꏚ 하반기 추진계획

○ 사 업 량 : 3개 노선  L = 2.45km

○ 사 업 비 : 350백만원

○ 추진계획 : 공사완료(2005년 12월)

ꏚ 이후계획

○ 사 업 량 : 26개 노선  44개마을  L= 59.55㎞

○ 사 업 비 : 7,706백만원 정도

○ 사업기간 : 2006 ～ 2007년

ꏚ 2005년 추진상황

동	위치	사업개요	사업비 (백만원)	비 고 (공정)
계	6개 노선 7개소	D80~250m L=5.75km	800,000
삼천3동	비아마을외 2개소간	D80~100mm L=1,000m	100,000	95%
조 촌 동	원동마을	D80~250mm L=1,000m	150,000	수 공 용수구 협의중
우아 2동	금하~원금상	D80~250mm L=750m	150,000	100%
동 산 동	파철리	D80~150mm L=1,000m	100,000	하반기
동서학동	색장	D80~100mm L=1,000m	100,000	하반기
평 화 동	세내길~삼천교	D80~150mm L=1,000m	120,000	95%
도로굴착	관내	31.4a	80,000

간이 급수시설 유지 관리

○ 상수도 미 공급지역 간이급수 시설에 대하여 상수도 공급시까지

철저한 수질관리 및 시설의 유지관리로 이용하는 시민의 건강을

보호하고 시설이용의 불편을 최소화

ꏅ 사업개요

○ 현    황 : 41개소(간이상수도 21개소, 소규모급수시설 20개소)

완산구 : 19개소, 덕진구 : 22개소

○ 사 용 자 : 5,502명(완산 2,738명, 덕진 2,764명)

○ 관리방법

- 유지관리 : 주민자치 협의회 구성으로 자체 유지관리

- 수질관리 : 수질검사 년간 6회실시(사업소에서 직접실시 반기2, 분기4)

ꏚ 2005년 추진계획

○ 노후시설물 모터펌프교체 및 배수지 보수 : 4개소

○ 기능상실 시설물 타용도 전환 및 폐공처리  : 2개소

○ 사 업 비 : 25백만원(도비 10, 시비 15)

ꏅ 상반기추진실적

○ 원․정수 정기 수질검사 실시  : 3회

○ 유지관리 정기 점검           : 2회

○ 간이상수도 취수원 및 관로보수 : 1개소

○ 간이상수도 모터펌프 수리 : 1개소

ꏅ 하반기 추진계획

○ 노후 시설물 모터 펌프 교체 및 배수지 보수 : 3개소

○ 기능상실 시설물에 대한 폐공처리 : 2개소

노후 및 고장계량기 교체

ꏅ 사업개요

○ 사 업 량 : 335,201개

○ 추진기간 : ‘92～2011년

○ 사업비(‘92～2011) : 12,959백만원(시비)

○ 사업내용 : 노후(유효만기) 계량기 및 고장계량기 교체

(※ 계량에관한 법률이 정한 유효기간 : 50mm이하 : 8년,  50mm초과 : 6년)

ꏚ 2004년까지 교체실적

사업내용	계	2004년 까지	2005년도	2006년도	2007년 이후
계량기교체	335,201	178,964	20,000	20,000	116,237
사 업 비	12,959	4,787	753	860	6,559

ꏅ 상반기 추진실적

○ 사  업  량 : 노후, 고장계량기 교체  6,781전

○ 사  업  비 : 367백만원

ꏅ 하반기 추진계획

○ 사 업 량 : 노후, 고장계량기 교체 : 13,219개

○ 사 업 비 : 386백만원

ꏅ 기대효과

○ 계량기 불감수량을 감소시켜 유수율 제고 및 상수도 사용료

세입 증대

※ 년간평균 유수율 제고 1.7%(급수수익 감소방지 1,213백만원)

절수기기 보급 확대

○ 공공시설물, 공동주택, 단독주택의 급수장치에 절수기기를 설치

물절약을 생활화하고 물의 소중함을 인식시켜 21세기의 물부족

사태에 적극적으로 대처

ꏅ 사업개요

○ 총 계 획 : 595,000개

(양변기 132,141  수도꼭지 462,859)

○ 사 업 비 :  1,200백만원

○ 사업기간 :  2000 ～ 2005년

ꏚ 2004년까지 실적

○ 설치 절수기 : 269,834개(45.0%)

- 양변기 절수기   : 110,971개(84.0%)

- 수도꼭지 절수기 : 158,863개(34.0%)

ꏚ 2005년 추진계획

○ 사업규모 : 30,000개

- 양변기 절수기   :   1,000개

- 수도꼭지 절수기 :  29,000개

○ 사 업 비 : 52,286천원(인건비 19,586, 자재비 32,700)

ꏅ 상반기추진실적

○ 설치 절수기      : 19,000개

ꏅ 하반기 추진계획

○ 수도꼭지 절수기 : 10,000개

ꏅ 기대효과

○ 가구당 년평균 절수량 : 54.0㎥ (년간 18%) → 677/㎥

○ 가구당 년평균 절감액 : 34천원 → 426백만원/년

수질검사기관 운영의 활성화

○ 국가공인 수질검사기관의 효율적인 운영을 통하여 검사기관의

신뢰성 확보 및 수수료수입 증대로 상수도경영행정의 지속적 구현

ꏅ 사업개요

◦ 지정번호 : 먹는물수질검사기관 제 33호

◦ 지정일자 : 2000. 7. 25  [국립환경연구원 승인]

◦ 검사범위 : 먹는물(수돗물 등), 상수원수, 먹는샘물, 각종 지하수

◦ 수 수 료 : 검사시료에 따라 5,300원/건 ～ 283,900원/건

ꏅ 상반기추진실적

◦ 각 시․군 교육청 및 지하수개발업체(100여개소) 등에 홍보실시 : 2회

◦ 수탁검사 운영실적

- 2000～2004.12      -----  1,416백만원(33,978건)

- 2005년도 상반기   ----    237백만원( 5,576건)

※ 2004년 상반기(141백만원)대비 68% 수수료수입 증가

◦ 2005년도 전국 수질검사기관 정기 정도심사(AQC)실시 : 적합판정

ꏅ 하반기 추진계획

◦ 신속․정확․친절한 대민서비스를 통하여 수탁 검사율 증진

- 검사수수료 수입목표 : 480백만원 정도

ꏅ 기대효과

◦ 검사기관 운영의 활성화를 통한 수수료 수입증대로 경영행정 구현

상수도 수질검사의 선진화 추진

○ 과학적인 수질관리와 첨단분석장비를 동원한 선진국 수준의 철저한

수질검사를 통하여 시민이 신뢰하는 안전한 수돗물을 공급

ꏅ 사업개요

◦ 관련법규 : 「수도법」및 「먹는물수질기준및검사등에관한규칙」

- 수질검사 항목 : 55개항목 (광역시 이상 75개항목)

- 상수도 공급과정별 철저하고 한층 강화된 수질검사 추진

구 분	법적 수질검사	실시 현황
원 수	분기별 23개항목	매월 23개항목
정 수	55개 항목 실시	85개 항목 실시
수도꼭지수	매월 59개소 4개항목	60개소 7개항목

ꏅ 상반기 추진실적

◦ 선진국 수준의 수질검사항목 확대실시로 수돗물의 안전성 검증증대

◦ 안심하고 마실 수 있다는 수돗물의 신뢰성 제고

- 민․관합동 수질검사 실시 및 검사결과 공개 : 27개소

- 상수도 정수처리 및 실험과정 시민공개 실시 : 11개 단체 700명

ꏅ 하반기 추진계획

◦ 과학적이고 체계화된 수질관리 및 분석력 제고로 안전한 물공급

- 상수원수의 수질변화에 따른 과학적인 정수처리 공정운영

- 수돗물의 유해성 여부의 진단을 철저히 시행하여 시민의 건강보호

◦ 수돗물에 대하여 시민이 신뢰할 수 있는 방안을 지속적으로 추진

- 민․관합동 수질검사 이행 철저 및 정수처리과정 등을 공개

ꏅ 기대효과

◦ 안전한 수돗물 공급으로 시민의 건강보존 및 수돗물의 신뢰성 제고

상수도 사업장 유지관리

○ 각 사업장 시설물을 체계적으로 유지 관리하여 안전사고 사전예방

○ 송수관로 누수등 돌발사고시  신속한 복구로 안정적인  수돗물생산

ꏅ 사업개요

○ 사  업  장 : 17개소(취수장 5, 정수장 4, 배수지 8)

○ ‘05년 예산 : 283백만원

○ 사업내용

- 매월 정기적인 안전점검을 실시 노후 및 고장시설 보수․보강

- 정수장 시민공개에 따라 사업장 환경개선사업 지속 추진

- 불시 사고 대비 정수생산 중단 등의 불안 요인 사전 점검정비

ꏅ 상반기 추진실적

○ 시설보수 및 개량 : 17건 90백만원

- 구축물(토목) : 지하수 원상복구(폐공)공사외 3건    - 53백만원

- 기 계 시 설 : 대성정수장 정수처리 노후수선외 5건  - 17백만원

- 전 기 시 설 : 대성정수장 저압전기설비 수선외 6건  -  20백만원

- 자체점검보수 : 낙뢰방지기 및 케이블 교체 외 50건

ꏅ 하반기 추진계획

○ 사업장 유지․보수 철저

- 구      축      물 : 사업장 시설개량․환경개선(도색, 방수등) 유지보수

- 기계․전기시설 : 취․정수장 기계, 전기시설 및 고장시설 긴급보수

- 기타 응급복구 : 도․송수관 누수 시 긴급보수, 기타 경미한 사항 자체보수

※ 소요사업비 : 193백만원

유수율 제고 사업 추진

○ 2005년을 유수율 제고의 원년의 해로 선포하고 대대적인 누수탐사,

불필요한 급수선정리 및 통합공사 등 각종 유수율 제고사업을 적극

추진하여, 시민에게 저렴하고 질 좋은 상수도를 공급하고자 함

ꏅ  추진실태 및 문제점

○ 연간 누수관련 민원 처리

- 2003년도 : 3,702건 (일 평균 10건)

- 2004년도 : 2,870건(일 평균 8건→2건 감소)

○ 노후 급․배수관이 많아 유수율은 해마다 감소

- 64.05%(2002년) ⇒ 62.21%(2003년) ⇒61.51%(2004년)

○ 우리시는 정수의 구입단가가 높은 광역상수도에 의존함으로서

상수도 특별회계의 재정을 더욱 압박하고 있음

※ 선진 타 도시에서 시행하고 있는 구역 계량, 블록화 사업 등을

적극 시행하여 유수율을 향상시켜야 할 것으로 판단됨

ꏚ 2005년 추진계획

○ 불필요한 급․배수관정비 : 10개소 100백만원

○ 적극적인 누수탐사활동 전개 : 연중(탐사인원 4명)100건 계획

○ 노후 급․배수관 정비사업추진 : L=15㎞  1,807백만원

○ 2005년도 구역계량 시범사업 시행 : 1개소 62.2㏊

○ 수계조정을 통한 유수율 향상사업 시행

ꏅ  상반기 추진실적

○ 누수민원 처리 : 도로누수 등 1,410건 민원처리 완료

○ 불필요한 급․배수관정비 : 1개소 17백만원(2005. 6. 2)

○ 누수탐사 실적 : 60건 탐사 조치

○ 노후 급․배수관 정비 : L=6.3㎞  647백만원

○ 수계조정을 통한 유수율 향상사업 실시(인후수계→천마수계로 전환)

- 위    치 : 금암, 덕진, 진북, 서노, 인후동 일부지역 (2.32㎞)

- 사업개요 : 제수변 설치 10개소(Ø150~400)

- 사 업 비 : 30백만원

- 효    과 : 수계조정한 지역내 평균수압 2㎏/㎠ 이상 강하

ꏅ  하반기 추진계획

○ 불필요한 급․배수관정비 : 9개소 83백만원(2005. 7~12)

○ 적극적인 누수탐사 활동 전개

○ 노후 급․배수관 정비사업 추진 : L=8.68㎞  1,160백만원

○ 태평동 일대 구역계량 시범사업 시행 : 1개소 62.2㏊

- 사업개요 : 유량계 및 제수변 설치(2005. 8~10월)

- 사 업 비 : 100백만원

상수도 특별회계 부채 경감

ꏅ 부채현황(2004. 12월말 기준 ) --- 39,569백만원(원금)

○ 지역개발기금(4.5%) ----- 17,004백만원

○ 재특자금 (3.58%) ----- 14,859백만원

○ 환특자금 (3.43%) ----- 7,706백만원

ꏅ 감축반안

○ 상수도 공기업 지방채 부채 획기적 축소로 건전 재정운영

- 2004년말 원금 396억원⇨2006년까지 원금342억원으로 경감

(원금 54억원 감 15.7%)

○ 상수도 시설개량(맑은물공급대책)사업 외 지방채 추가발행 제한

- 매년 발행액 15억(이자율 3.09%중 국고보조 1.28%)

○ 매년 부채상환기금 5억원 이상 출연 고금리순 부채 조기상환

ꏚ 2005년 상환계획

○ 총 상환액 --- 6,774백만원(원금 5,280백만원, 이자 1,494백만원)

- 납기 도래분 상환 : 3,930백만원 (이자 1,494백만원)

• 지역개발기금   : 2,998백만원 (이자 765백만원)

• 재 특 자 금   :   932백만원 (이자 510백만원)

• 환 특 자 금   :              (이자 219백만원)

- 고금리(4.5%)조기 상환액(지역개발기금) : 2건 1,350백만원

○ 지방상수도 시설개량사업 지방채 발행(재특자금) : 1,500백만원

ꏅ 2005년도 상반기 상환실적

총 상환액 : 996백만원(원금 582백만원, 이자 414백만원)

○ 납기도래 정기분(1/4, 2/4) ◦ 지역개발기금 116백만원 이자 52백만원

◦ 재 특 자 금 466백만원 이자 262백만원

◦ 환 특 자 금            이자 100백만원

○ 지방상수도 시설개량사업 지방채 발행(재특자금) : 1,500백만원

ꏅ 2005년도 하반기 상환계획

○ 총 상환액 --- 5,778백만원(원금 4,698백만원, 이자 1,080백만원)

- 납기 도래분 상환(3/4, 4/4) : 3,348백만원 (이자 1,080백만원)

• 지역개발기금   : 2,882백만원 (이자 713백만원)

• 재 특 자 금    :   466백만원 (이자 248백만원)

• 환 특 자 금    :              (이자 119백만원)

- 고금리(4.5%)조기 상환액(지역개발기금) : 2건 1,350백만원(년 4.5%)

※ 2005년말 부채 예상 : 35,789백만원