제224회 전주시의회 제1차 정례회

도 시 건 설 위 원 회

2005년도

주요업무 추진상황 보고

도 시 관 리 국

보  고  순  서

□	일 반 현 황		-----------	2
□	2005년도 시 책 방 향		-----------	9
□	2005년도 주요업무추진상황보고		-----------	10
	○	도 시 과	-----------	11
	○	주 택 행 정 과	-----------	19
	○	도 로 과	-----------	26
	○	교 통 과	-----------	45
	○	하 수 과	-----------	54
	○	도 시 발 전 기 획 단	-----------	68
	○	차 량 등 록 사 업 소	-----------	72

일  반  현  황

ꏅ 기구 ꠚꠚ  5과  1단  1사업소  32팀(현원 150명)

															도 시 관 리 국
	도 시 과														주 택 행 정 과																도 로 과
기업회계			도시계획				택 지 개발			토지관리				상가활성화			농촌지역개발			도심재정비			공동주택			일반건축				가로환경개선			도로재산관리			도로개설				철도			도로유지관리			도로교통시설

	교 통 과																하 수 과																도시발전기획단													차량등록사 업 소
주차장관리			운송사업지도			대중교통			경전철			교통정보관리				하수도공기업			하수시설			하수처리관리			재난방재			하천관리				용지보상			35 사 단 이 전				공단조성			신시가지조성			총괄지원			등록			건설기계등록

ꏅ 인 력

과 별		총 계	일 반 직						별정	기능
			4급	5급	6급	7급	8급	9급
계	정 원	146	1	7	32	43	34	4	1	24
	현 원	150	1	7	32	57	22	3	1	27
도 시 과	정 원	21	1	1	4	4	7	1	1	2
	현 원	20	1	1	4	7	4		1	2
주택행정과	정 원	18		1	5	8	4
	현 원	18		1	5	9	3
도 로 과	정 원	22		1	6	9	5			1
	현 원	22		1	6	12	2			1
교 통 과	정 원	29		1	5	8	5	2		8
	현 원	31		1	5	11	2	3		9
하 수 과	정 원	19		1	5	7	4	1		1
	현 원	20		1	5	8	4			2
도시발전 기 획 단	정 원	15		1	4	6	3			1
	현 원	15		1	4	7	2			1
차량등록 사 업 소	정 원	22		1	3	1	6			11
	현 원	24		1	3	3	5			12

ꏅ 분장사무

과 별	분 장 사 무
도 시 과	○ 도시계획결정․지적고시, 도시계획사업 시행인가 ○ 택지개발사업․구획정리사업, 터미널법원등 이전사업 ○ 전문건설업 및 건설기계사업자, 건설기계조종사 관리 ○ 개별공시지가, 지적측량검사, 새주소부여사업관리
주택행정과	○ 국민주택관리․상환금 운영, 학교용지부담금 부과 ○ 주택건설사업계획승인, 사용검사, 주택정책 수립 ○ 건축인․허가, 건축심의, 건축조례 제․개정운영 ○ 주거환경개선, 구도심활성화사업, 농촌지역개발사업
도 로 과	○ 도로부지관리, 도로안내표지판 설치관리 ○ 도로포장 보수지도, 자전거도로 시설 ○ 신규도로개설 및 용지보상, 도시가로망 확충사업 ○ 가로환경 및 노점상 지도단속, 자전거이용 활성화 ○ 도로교통 안전시설물 신설 및 유지관리
교 통 과	○ 교통종합계획 수립, 공영주차장 확충 및 관리 ○ 자동차운송사업체(버스. 택시 등) 지도감독 ○ 교통정보센타 운영 및 교통체계 개선사업 ○ 대중교통(버스, 택시, 화물) 업무 추진 ○ 경전철 사업 추진
하 수 과	○ 하수도공기업 운영, 건교부소관 국․공유재산 관리 ○ 하수처리장 건설, 하수 관거사업 추진 ○ 하수종말처리시설 운영관리 ○ 재난재해대책, 자연하천조성사업, 하천관리
도시발전기획단	○ 서부 신시가지 조성사업 ○ 35사단 이전사업 ○ 연초제조창부지활용, 전주교도소이전, 첨단산업단지조성
차량등록사업소	○ 자동차 등록(전산입력, 자료관리 및 증명발급 등) ○ 자동차 및 건설기계 과태료부과 ○ 건설기계등록(전산입력, 증명발급,검사최고, 정비명령 등)

ꏅ 기본현황

○ 도시계획 연혁

년 월 일	고 시 청	번 호	계획면적 (㎢)	목표 년도	계획인구	주 요 내 용
1938. 5. 9	조선총독부	403	19.76	1948	100,000	도시계획구역 결정(1차)
1966. 2.10	건설교통부	2,188	108.71	1983	550,000	도시계획 재정비(2차)
1970. 4.14	″	178	157.22	1986	500,000	도시계획 재정비(3차)
1973. 6.27	″	258	313.20			개발제한구역 216.4㎢ 지정
1974. 8.14	″	272	313.20			도시계획 재정비(4차)
1976. 3.27	″	37	313.20			도시계획 재정비(5차)
1986. 5. 8	″	206	313.20	1991	610,000	도시계획 재정비(6차)
1995. 6.29.	전라북도	112	313.20	2001	860,000	도시계획 재정비(7차)
2003. 6.26	건설교통부	161	302.67			개발제한구역 225.4㎢해제

○ 용도지역  --------------------  4개지역 302.67㎢

구분	주 거 지 역			상업 지역	공 업 지 역				녹 지 지 역
	계	일 반 주 거	준주거		계	전용공업	일반 공업	준공업	계	생산 녹지	자연 녹지	보전 녹지
면적	31.520	31.613	0.357	4.201	6.290	1.444	4.178	0.668	260.655	40.327	111.155	109.173
비율 (%)	10.41	10.29	0.12	1.39	2.08	0.48	1.38	0.22	86.12	13.32	36.73	36.07

○ 용도지구  ----------------  8개지구 16,138,933㎡ (4,882천평)

지 구 명	개 소 수	면 적(㎡)	비 고
고 도	16	7,955,679
방 화	20	4,165,097
미 관	57	2,039,727
자연취락	58	1,225,851
경 관	7	406,500
시설보호	1	249,900
아 파 트	1	90,000
보 존	2	6,179

○ 주  택

구 분	계	단독주택	다세대 주택 동당660㎡미만	연립주택 (4층이하)	아파트 (5층이상)	주택보급율 (2004년도)
주택수	180,515	58,096	4,535	3,414	114,470	88.95%
비율(%)	100	32.18	2.52	1.89	63.41

○ 지  적

(단위 : ㎢)

구분	합 계		대 지			임 야			기 타
	필지수	면적	필지수	면적	%	필지수	면적	%	필지수	면적	%
계	192,824	206.3	72,916	24.1	11.7	11,123	72.3	35.0	109,785	109.9	53.3

○ 도  로

(단위 : 개소, ㎞)

구 분	계		고속국도		일반국도		지 방 도		시 도
	노선	연 장	노선	연 장	노선	연 장	노선	연 장	노선	연 장
총연장	850	407	1	5	5	62	3	22	841	318
포장도	850	407	1	5	5	62	3	22	841	318
포장율 (%)		100		100		100		100		100

※ 도로율 : 16.28%(도로면적/시가지면적)

○ 교량 및 기타시설물

(단위 : 개)

구분 계	교 량					육교 보도	지하 보도	지하차도	터널	비 고
	소계	고속 국도	시의 국도	지방도	시도
123	104		34	3	67	6	6	5	2

※ 장대교량(삼례교 : 570m,  회포대교 : 707m)

○ 건설기계조종사면허 현황

(단위 : 건)

계	불도우저	굴삭기	로우더	지게차	기중기	로울러	기 타
5,990	360	2,003	505	1,449	294	111	1,268

○ 옥외광고물 현황

(단위 : 개)

광고업자 등록현황	시 지 정 광 고 시 설				비 고
	계	게시대	벽보판	기 타
466	511	150	361	-

○ 운수업체

(단위 : 개소/대)

구 분	계	버 스			택 시		화 물		렌트카	특수차	특수여객
		시내	시외	관광	회 사	개 인	회 사	개 인
업 체 수	218	5	5	19	25	2	79		21	49	13
보유대수	9,808	407	443	321	1,599	2,162	1,766	2,050	811	224	25

○ 자동차등록

(단위 : 대)

합 계	승 용 차	승 합 차	화 물 차	특 수 차
197,478	145,688	13,395	38,086	304

○ 하  천

(단위 : ㎞)

구 분		개소	하천연장	제 방 연 장			개수율 (%)	비고
				계	기개수	미개수
계		32	132.8	202.2	182.4	19.8	90.2
법정하천	소 계	29	127.0	189.4	176.0	13.4	93.0
	국가하천	3	24.7	25.6	25.6	-	100.0
	지방 1급	2	18.2	37.5	36.0	1.5	96.0
	지방 2급	24	84.1	126.3	114.4	11.9	90.6
소 하 천		3	5.8	12.8	6.4	6.4	50.0

○ 하 수 도

구 분		처리구역 (㎢)	계획연장 (㎞)	시설연장 (㎞)	미시설연장 (㎞)	보급율 (%)	비고
계		53.1	2,317	1,321	996	57.0
합 류 식		18.9	653	653	0	100.0
분류식	소 계	34.2	1,664	668	996	40.1
	오수관거	-	920	435	485	47.2
	우수관거	-	744	233	511	31.3

○ 하수․위생처리 시설

구 분	하 수 처 리	위 생 처 리
위 치	덕진구 송천동 2가 1130번지
시설용량	1일 처리능력 ⇨ 403,000㎥ - 1단계 시설 : 103,000㎥ - 2단계 시설 : 200,000㎥ - 3단계 시설 : 100,000㎥	1일 처리능력 ⇨ 290㎘ - 분 뇨 : 30㎘ - 정 화 조 : 260㎘
처리방법	1․2단계 표준 활성 슬러지법 3단계 고도처리 공법	하수 연계처리 (1994년부터 시행)

○ 차집관로

하 천 명	연 장 (㎞)	맨 홀 (개)	우수토실 (개소)	환기구 (개소)	여수토실 (개소)
계 (5개노선)	71.8	1,110	227	8	79
전주천 (좌, 우안)	33.3	516	143	7	47
삼 천 (좌, 우안)	13.4	155	41		17
금암천 (좌, 우안)	2.9	82	20		9
아 중 선	11.4	174	13		4
팔복선(공장,생활)	10.8	183	10	1	2

2005년도 시책방향

	도시공간 구조개선으로 광역도시 기반구축
◦ 100만 인구의 수용이 가능한 도시기반시설 확충 ◦ 생태적이고 쾌적한 환경조성으로 경쟁력있는 도시건설 ◦ 재난 재해의 사전예방으로 살기 좋은 전주건설

⇩

	중점추진방향
			ㅡ
		ㅣ
◦ 도시기반시설 확충을 위한 도시계획 관리계획 마무리 ◦ 계획적인 택지개발로 안정된 주택공급 및 도시기반시설 구축 ◦ 미래 지향적인 교통체계 주축과 양질의 대중교통서비스 제공 ◦ 구도심과 신시가지 균형발전으로 시민의 삶의 질 향상 ◦ 생태하천 조성으로 자연환경 보존 및 수질 개선

2005년도

주요업무추진상황 보고

도 시 과  소 관

ꊱ	전주도시관리계획 재정비 추진 ------------	12
ꊲ	도시계획 시설부지 매수청구제 시행 -------	14
ꊳ	송천지구 토지구획정리사업 ---------------	15
ꊴ	아중지구 체련공원조성사업 ---------------	16
ꊵ	광장조성 및 소로개설사업 추진 -----------	17
ꊶ	새주소부여사업 활용 ---------------------	18

도시관리계획 재정비 추진

□ 도지사 권한사항

○ 주민의견청취 ---------------------- 2004.11.24～12.07

○ 전주시의회 의견청취 --------------- 2004.12.20

○ 전주시 도시계획위원회 자문 -------- 2004.12.24

○ 전라북도 지방도시계획위원회 상정 -- 2005.01～02

○ 도시관리계획 재정비 완료 ---------- 2005.03

□ 시장 권한사항

구 분		폭원(m)	노 선 수
			계	집 행	미집행	미집행비율(%)	비고
계			2,804	2,069	735	26.2
광 로		40 이상	4	3	1	25.0
대 로		25～40	47	17	30	63.8
중 로		12～25	240	171	69	28.8
소 로		6～12	2,513	1,878	635	25.3
	1 류	10	323	249	74	22.9
	2 류	8	925	661	264	28.5
	3 류	6	1,265	968	297	23.5

※ 2005년 예산 : 284백만원

□ 기본방침

○ 기존시가지 : 정비기준을 수립 과감하게 폐지 및 변경결정

○ 미개발지역 : 가능한 존치하고 시설기준에 불합리한 노선에

대하여는 일부 조정(개별 건축시 확보가능)

○ 전문가, 시민 등의 다양한 의견을 최대한 수렴하여 반영

○ 공정하고 투명하게 추진함으로서 행정신뢰도 제고

⃞ 추진실적

○ 장기미집행 도시계획시설(도로) 폐지(1차) --- 1999.11.15

- 소로 103개 노선

○ 장기미집행 도시계획시설(도로) 폐지(2차) --- 2002.03.13

- 소로 34개 노선

○ 장기미집행 도시계획시설 전수조사 ---------- 2003.09～

- 대  상 : 3,382개소

- 집  행 : 2,608개소

- 미집행 : 774개소

(도로735, 광장16, 학교6, 공원13, 녹지2, 유원지1, 기타1)

⃞ 이후계획

○ 현장실사 및 전문가 의견수렴을 거쳐 기본원칙을 확정하여

폐지 및 변경결정 방침 결정

- 정비대상 시설 전수조사 및 정비기준(안) 마련 - 2004.10～2005.01

- 전문가 의견수렴 및 자문 --------------- 2004.12～2005.03

- 폐지 및 변경결정 계획(안) 최종 결정 --- 2005.02～03

- 도시계획 변경결정 및 지적고시 --------- 2005.05

도시계획시설 매수청구제 시행

○ 대 상 : 2001.12.31기준 도시계획시설 결정후 10년 이상된 시설중

지목이 “대지”인 토지는 2002.1월부터 매수청구 가능

- 필지수 6,931필지  - 면적 493천㎡ (보상비: 3,823억원정도)

○ 절 차 : 청구일부터 2년이내 매수여부 결정, 결정 후 2년이내 매수

□ 매수청구 현황

○ 매수청구기간(2002.1～2005.5월말 현재)

- 신 청 건 수 : 133건  (도로 118, 공원 12, 기타  3)

- 청 구 면 적 :  25천㎡(도로  16, 공원  7, 기타  2)

- 매수 추정액 : 206억원(도로 148, 공원  9, 기타 49)

○ 연도별 신청건수 : 2002년(85건) 2003년(28건) - 2005년 통보

2004년(12건) 2006년 (8건) - 2006년 통보

※ 2005년 추경예산 : 10억원 (장기미집행대지보상특별회계)확보

□ 추진실적

○ 매수결정 통보 100건 141억원

- 2002년도 접수분(매수 68건 107억원, 불가 17건 12억원)

- 2003년도 접수분(매수   7건    9억원, 불가   8건 13억원)

․도시계획시설내 건축허용대상 : 매수 불가 통보한 토지 및

매수 통보한 날로부터 2년 이내에 매수하지 못한 토지

- 건축허용범위 : 철근콘크리트 및 철골철근콘크리트가 아닌

건축물로 단독주택(3층이하), 제1종근린생활(3층이하), 공작물

□ 이후계획

○ 2005년 제1회 추경에 확보된 10억원으로 연내 보상 시행

○ 토지소유자로부터 매수청구 접수후 현지 여건 분석

○ 도시계획시설 매수청구시 관련부서 협의 및 전문가 의견수렴

○ 시설별 소관부서 매수여부 참조하여 분기별 최종 결정 통보

송천지구 토지구획정리사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 송천동 1‧2가 일원(농수산물 도매시장 남단)

○ 사업규모 : 택지조성 262,480㎡(79,400평)

○ 총사업비 : 22,600백만원(공사비12,011 보상비 및 기타10,589)

○ 사업기간 : 2001.07 ～ 2005.12

※ 시설녹지 사업비 13억원 - 1회추경 확보

□ 추진실적(공정율  95%)

○ 사업 인가 시행  ---------------------------  ’01.07

○ 사업 착공  --------------------------------  ’01.11

○ 도시계획 변경 및 지구단위계획 결정고시  ---  ’04.03

○ 환지예정지 지정 및 공고  ------------------  ’04.08

○ 환지처분에 따른 토지평가 위원회 개최  -----  ’04.12

○ 환지 확정측량 완료(대한지적공사)  ---------  ’05.03

※ 잔여 공사분 (농수산물 도매시장 남단 시설녹지조성)

- 녹지개요 : L=296m L=15m A=4,550㎡(총 9필지)

- 사업시행 인가조건(환경청 협의사항)사항으로 사업비 13억원

추경예산이 확보됨에 따라 잔여 공사분 정상 추진중

□ 이후계획

○ 공사완료 ----------------------------------- ’05.10

○ 환지확정처분 및 등기  ---------------------- ’05.10

○ 사업완료  ---------------------------------- ’05.12

아중지구 체련공원 조성사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 인후1가, 우아1가 일원(아남아파트 남측)

○ 사업규모 : 부지 49,037㎡(14,834평)

○ 사 업 비 : 110억원(1단계 97,  2단계 13)

○ 사업기간 : 1단계(2002~2005), 2단계(2006~2007)

- 1단계 : 다목적구장, 국민체육센터(수영장), 혼합경기장, 게이트볼장, 조경휴게지

- 2단계 : X-game장(광장포함),배구장, 배드민트장 등

※ 국민체육센터 : 부지1,997평(건축면적368평 지하1층,지상2층)

․주요시설 : 수영장 211평(25m×6레인), 헬스장 63평

□ 추진실적(공정 95%)

○ 공사 착공 -------------------------------- 2003.11.26

○ 토지수용위원회 재결 및 공탁절차 이행완료 - 2004.08.15

○ 국민체육센터 착공(공정 50%) ------------- 2004.10.04

- 골조공사 완료, 지붕철골 판넬완료, 미장공사중

□ 이후계획

○ 아중체련공원(1단계) 준공  ---------------- 2005.07

○ 국민체육센터 준공  ----------------------- 2005.11

광장조성 및 소로개설사업 추진

□ 6호광장 조성사업

○ 위    치 : 완산구 고사동 오거리 인근

○ 조성면적 : A=724㎡(약220평)

○ 사 업 비 : 31억원(보상비및철거비 29억, 공사비 2억)

○ 사업필요성

- 전주시 중심부의 쾌적한 환경조성 및 걷고싶은 거리

영화의 거리등과 연계 구도심 활성화에 기여

○ 추진계획

- 편입토지 감정평가 및 보상협의(22억원 확보) -- 2005. 10

- 사업 추진 -------------------------------- 2006년

□ 우석대 한방병원 인근 소로개설공사

○ 위    치 : 완산구 중화산동 우석대 한방병원 인근

○ 사업개요 : L=320m  B=10m

○ 사 업 비 : 17억원(보상비 10억, 공사비 7억)

○ 사업필요성

- 어은로 및 MBC방송국 진입로, 예수병원 뒷길 교차 지점의          극심한 교통정체의 해결을 위한 교통체계 개선필요

○ 추진계획

- 행정철차 이행 ------------------------- 2005. 08

- 편입토지 감정평가 및 보상협의 --------- 2005. 10

- 사업착공 ------------------------------ 2005. 10

새주소부여사업 활용

새주소사업이 완료되었으나 아직도 새주소에 대해 잘모르는

시민이 있어 더 많은 홍보활동으로 편리한 생활주소로 활용

할 수 있도록 하기 위함

□ 사업개요

○ 기  간 : 1999. 1 ~ 2002.5.30(이후 유지관리 계속)

○ 대  상 : 전주시 전지역(농촌동 포함)

○ 사업비 :  1,850백만원(국비210  시비1,640)

○ 시설물 : 도로명판 5,670개소  건물번호판 65,000개 부착

□ 홍보 추진실적

○ 새주소 홍보 퀴즈 이벤트 실시(3회) : 3,498명 참여

○ 배달 전문업소(피자, 중국음식, 족발 등)에 주변 지도 배부 후

사용방법 등에 대해 교육

○ 우체국등과 협의하여 새주소이용 우편물 신속배달

○ 인터넷 새주소안내 시스템 운영 : 접속자수 98,300(1일 220명)

○ TBN전주교통방송 미디어 전북에 도로명 소개 및 유래 홍보 : 44회

○ 건물번호판을 일제조사하여 변경,훼손분에 대한 부착 : 355개

○ 2005. 3.3 JTV 심층취재 새주소 홍보 방송 (25분): 1회

□ 문제점 및 대책

○ 새주소로 전환하기 위해서는 우편번호가 개편되어야 하는데

현재 정보통신부에서 새주소 우편번호에 대하여 개발 중

□ 이후계획

○ 시민들에게 각종 문서발송시 구주소와 새주소 병기 발송

○ 전주시 홈페이지를 이용 새주소 활용에 대한 퀴즈이벤트실시(분기별)

○ 관내 건물번호판을 지속적으로 조사 관리

주택행정과 소관

ꊱ	구도심 활성화사업 추진 --------------------------	20
ꊲ	농촌지역 환경개선(숙원)사업 ---------------------	21
ꊳ	농촌 주거환경개선(마을정비)사업 -----------------	22
ꊴ	노후공동주택 관리비용 지원 ----------------------	23
ꊵ	임대주택 주거환경개선 사업추진 ------------------	24
ꊶ	도시주거환경 개선사업추진 -----------------------	25

구도심 활성화사업 추진

□ 사업개요

○ 대    상 : 구도심권 14개동 12㎢

- 특화․특정거리 조성 : 7개소(걷고싶은․영화․차이나․웨딩․약전․동문․공구)

- 주차장 확충 : 4개소(오거리, 중앙시장, 남부시장, 웨딩거리)

- 보조금 지원 : 4대문안 내 건축․수선

○ 사업기간 : 2002.08 ～ 2011.12(10개년)

○ 사 업 비 : 68,049백만원(지금까지 실적 11,602백만원)

2005년 예산 : 650백만원(시설비 250, 보조금 400)

□ 추진실적

○ 특화ㆍ특정거리 조성공사 완료(걷고싶은․차이나․영화거리)

○ 오거리 주차장시설 완료(202면)

○ 구도심활성화지원조례에 의한 보조금 지원 심의

□ 문제점 및 대책

○ 웨딩ㆍ약전거리 조성사업비 20억원 미확보로 사업추진에 어려움 -> 2006년 예산확보 지속추진

□ 이후계획

○ 특화거리 조성  -------------------- 2005.03～2006.12

- 웨딩거리 실시설계 용역  -------------------- 2005.08

- 지중화사업 : 1개노선 450m(웨딩거리) ------ 2005.10

○ 구도심활성화를 위한 보조금 지원

농촌지역 환경개선(숙원)사업

도심과 상대적으로 소외받고 있는 농촌지역의 열악한 주거환경을 개선함으로써 살기좋은 농촌을 건설하고, 도․농간의 지역균형발전 도모

□ 농촌지역 현황

○ 마 을 수 : 206개마을

○ 면    적 : 430㏊    (완산 167, 덕진 263)

○ 인 구 수 : 39,587명 (14,546세대)

□ 사업개요

○ 총 사업비 : 37,692백만원   (624건)

○ 기     간 : 2005 ～2009년 (5개년)

○ 사업대상 : 도로, 상․하수도, 주민편익시설 등 기반시설

□ 2005사업개요

- 사 업 비 : 30억원 (완산 13, 덕진 17)

- 대상지역 : 농촌지역 자연마을

- 사업선정 : 농촌지역 개발계획 용역결과에 의한 우선 순위별

사업의 시급성 및 타당성 등 검토 선정

- 주요사업 : 도로포장, 상하수도, 주민편익시설 등

□ 추진실적

○ 농촌지역 개발계획 용역완료  ----------  ’05. 2. 28

○ 2005 사업대상지 조사  ---------------  ’05. 3 ~ 4월

○ 양 구청 설계용역 시행  --------------  ’05. 5 ~ 7월중

□ 이후계획

○ 사업시행 (구청)   ---------------------  ’05. 7 ~ 12월

농촌주거환경개선(마을정비)사업

□ 사업개요

○ 대상지구 : 11개지구(농촌주거환경개선 사업지구 지정마을중                  행자부 사업승인)

․2004년 이월사업 : 2개지구 - 한절리, 삼천

․2004년 계속사업 : 2개지구 - 원석구, 오매

․2005년 신규사업 : 7개지구

- 하수처리 미설치 지구 (3개지구) : 원색장, 용산, 영동재방

- 하수처리 설 치 지 구 (4개지구) : 황소, 문정, 삼거, 만성옥계

2005년예산 : 6,670백만원 (국비 3,000 시비 3,000 명시 670)

□ 추진실적

○ 2004년 이월사업 2개지구 공사완료

○ 2005년 계속사업 2개지구 설계중

○ 하수처리 미설치 3개지구 설계용역 시행

․기  간 : ’05. 5. 30 ～ 7. 30

□ 이후계획

○ 2005년 계속사업 2개지구 사업발주  -  7월중

○ 2005년 신규사업 7개지구

․하수처리시설 미설치 3개지구

- 사업발주 : ’05. 7월중

․하수처리시설 설치 4개지구

- 공법선정 : ’05.  7월중

- 설    계 : ’05.  8. 1 ~ 9. 15

- 공    사 : ’05 .10. 1 ~ ’06. 3. 31

노후공동주택 관리비용 지원

□ 공동주택관리 현황

구 분	단지수	세대수	전용면적별(㎡)			국민주택규모
			60미만	60~85	85초과
계	431	118,411	63,444	39,210	15,757	102,654 (전체 86.7%)
아파트	361	115,444	61,861	37,958	15,625
연 립	70	2,967	1,583	1,252	132

○ 지원대상 노후공동주택 단지

- 완산구 : 39개단지/7,092세대

- 덕진구 : 53개단지/6,584세대

2005년 예산확보 : 200백만원

□ 추진실적

○ 2003.상반기 : 노후공동주택 실태조사

○ 2004.상반기 : 주택법개정에 따른 조례(안) 마련

○ 2005.6.24 : 전주시 주택조례 제정

- 지원대상 : 15년이상 아파트 전용 60㎡이하 50%이상 단지

- 지원금액 : 사업비의 70%이하로서 1,000만원이하

□ 이후계획

○ 2005. 7월 : 관리비용지원 희망단지 신청 접수

○ 2005. 8월 : 지원결정 및 시행

임대주택 주거환경개선 사업추진

□ 추진배경 및 개요

○ 2004년 건교부의 임대주택 주거환경개선사업 결정에 따라

10년이상 경과된 공공임대주택단지(영구임대)에 대한 노후

기반시설의 정비추진 - 우리시 평화주공1단지 해당

○ 2004년 사업확정 및 추경예산 확보에 따라 명시이월 2005년 추진

- Matching-fund 지원방식에 따라 시비(50%)확보시 국비(50%)지원

2005년 예산 : 442백만원(국 221, 시 221) - 명시이월

□ 추진실적

○ 영구임대주택 주거환경개선사업 수요파악 ----- 2004. 3.19

- 대상단지 : 평화동 주공1단지

○ 사업결정(건교부)에 따른 국고보조 지급신청 -- 2004. 7.06

○ 임대주택주거환경개선사업 및 사업비 확정통보 - 2004. 9.03

○ 임대주택 주거환경개선사업 협약체결(전주시-주공) - 2005. 3.25

□ 이후계획

○ 평화주공 1단지내 5개사업 추진(설계중) -------- 2005.03

- 5개사업 추진 : 사회복지관(2개소) 개보수, 장애인이동통로,                       안전보안시설, 어린이놀이터, 주차장시설확보

- 주택공사(주택관리공단) 및 사회복지관과 협의

○ 사업완료 및 정산 --------------------------- 2005.11

도시주거환경 개선사업

도시저소득 주민을 위한 주거환경개선의 지속추진으로 삶의 질을

향상시키고 모든 시민이 함께 잘사는 으뜸 복지도시건설

□ 사업개요

○ 위    치 : 진북동 도토리골지구 등 18개지구

○ 사업규모 : 863,571㎡(261,231평) 16,881명(5,1546가구)/3,822동

○ 총사업비 : 88,645백만원(국비36,596 도비8,123 시비43,926)

○ 사업기간 : 2001 ~ 2005년

□ 추진실적

○ 17개지구 지정고시 ------------------------ 1999.11.24

○ 낙수정지구 지정고시  ---------------------- 2002.12.26

○ 완  공 : 15개지구(도토리골, 어은2․3, 밤나무골, 앞검암 등)

○ 미완공 :  3개지구(낙수정, 인후농원, 난민촌2)

○ 현 전체공정의 95% 완료

- 도  로 82개노선     - 주차장 21개소     - 소 공 원 8개소

- 놀이터 15개소       - 경노당  8개소     - 이주유도 3개소

2005 예산 : 1,220백만원(국460 시760)

□ 이후계획

○ 난민촌2, 낙수정지구 공공기반시설, 주민복리시설 -- 2005.12

○ 인후농원(주택공사시행)

- 감정평가 보상실시, 주택철거 및 사업착수 ----- 2006.12

도 로 과 소 관

ꊱ	장승백이길(남부순환도로)개설 -------------	27
ꊲ	남천로(전주천 좌안도로) 확장 -------------	28
ꊳ	녹두길(전주진입로) 확장 ------------------	29
ꊴ	대학로 개설 및 확장 ----------------------	30
ꊵ	동산고가교 접속도로 확장 -----------------	31
ꊶ	견훤로 개설 ------------------------------	32
ꊷ	문화로 확장 ------------------------------	33
ꊸ	태평로 확장 ------------------------------	34
ꊹ	남도주유소～고속터미널간 도로확장 --------	35
	은행로 확장 ------------------------------	36
	원대한방병원～가련교간도로개설 -----------	37
	교통사고예방을위한 구조개선및안전시설물정비 ---	38
	어린이보호구역 개선사업 ------------------	39
	자전거도로 확충 --------------------------	40
	중앙분리대(화단) 설치 --------------------	41
	자전거타기 활성화 ------------------------	42
	서남권 국도대체우회도로개설 --------------	43
	북부권 국도대체우회도로개설 --------------	44

장승백이길(남부순환도로) 개설

□ 사업개요

○ 구    간 : 동서학동 좁은목 ～ 효자동 금구선(시의국도 27호선)

○ 사 업 량 : 연장 7,250m,   폭 25～35m

○ 사 업 비 : 114,579백만원

○ 사업기간 : 1988 ～ 2007(20개년)

※ 2단계(함대부락～금구선) 1,570m ⇒ 16,500백만원

□ 추진상황(1단계공정 : 77% - 투자액 : 73,423백만원)

○ 개  통 : 공수교～중인선(4,180m - 61,279백만원)  -  ‘88～’97

○ 용지매입 완료(장승백이길～거산황궁ⓐ～무궁화주유소)

: 973m - 9,310백만원 ---------------------------------- ‘04.12

○ 보조기층포설 : 장승백이길～거산황궁ⓐ(640m/2,834백만원)-‘04.12

《2005 추진계획》 ---  70.0%

○ 위    치 : 장승백이길～거산황궁ⓐ～무궁화주유소

○ 사 업 량(용지매입 및 공사)  L=973m

- 용지매입 : 교대뒤 440m

- 공사추진 : 장승백이길～거산황궁ⓐ ～무궁화주유소- 973m

○ 확보예산 : 4,300백만원

□ 이후계획(  L=860m  --  20,356백만원)

○ 거산황궁ⓐ～좁은목  L=860m,   B=25m

※ 2단계사업은 효자6지구사업과 병행 토지개발공사에서 시행        예정 (2005～2011)

남천로(전주천 좌안도로) 확장

□ 사업개요

○ 구    간 : 동서학동 한벽교～서신동 서신교(시의국도 1,27호선)

○ 사 업 량 : 연장 4,150m,   폭 8～12 ⇒ 25m

○ 사 업 비 : 45,336백만원

○ 사업기간 : 1998 ～ 2007(10개년)

※ 2단계(완산교～서신교) 2,140m ⇒ 15,187백만원

□ 추진상황(1단계공정 : 98.4% - 투자액 : 30,149백만원)

○ 개 통 (L=1,810m,  B=25m)

- 한 벽 교～싸전다리(L=1,050m B=25m) --- 2002.05

- 초록바위～매 곡 교(L=  760m B=25m) --- 2003.12

《2005 추진계획》 ---  공정 : 100%

○ 위    치 :  초록바위구간

○ 사 업 량

- 공사 : 인도포장 및 산마루 측구마무리 (L=200m, B=8⇒25m)

○ 확보예산 : 910백만원(선 시공분 부담금)

※ 2단계사업 실시설계용역 추진 : 설계완료------------2005.12

□ 이후계획

○ 2단계사업 시행(완산교～서신교  L=2,140m) - 15,187백만원

녹두길(전주진입로) 확장

□ 사업개요

○ 구    간 : 원대한방병원～팔복동 BYC(시의국도)

○ 사 업 량 : 연장 1,360m,   폭 35⇒50m

○ 사 업 비 : 17,000백만원

○ 사업기간 : 1999 ～ 2006

□ 추진상황(공정 45.0% -- 투자액 8,486백만원)

○ 원대한방병원～추천대교간 확장개통(L=710m) -- 2003.12

○ 추천대교～동화약품 하행선(205m)보상 및 공사-- 2004.12

《2005 추진계획》 ---  공정 : 80.0%

○ 위    치 : 추천대교 ～ 동화약품(시내⇒팔복동간 좌측)

○ 사 업 량 : L=300m

- 토지매입 : 95m

- 공 사 : 도로기반시설 및 포장 (편측 L=205m)

○ 확보예산 : 1,000백만원

- 용지매입 : 300백만원

- 공    사 : 700백만원

□ 이후계획

○ 추천대교～BYC(L=650m,  B=50m) : 7,514백만원

대학로 개설 및 확장

□ 사업개요

○ 구    간 : 금암동 사대부고～녹두길(시의시도)

○ 사 업 량 : 연장 2,630m,   폭 25～35m

○ 사 업 비 : 27,000백만원

○ 사업기간 : 1995 ～ 2006

□ 추진상황(공정 82.0%  --  투자액 : 22,000백만원)

○ 개  통 (L=1,450m,  B=25～35m)

- 사대부고 ～ 연화마을(L=1,200m  B=25m) -----  95～99

- 송천삼거리～도립국악원(L=250m B=35m) -----  03.12

《2005 추진계획》 ---  공정 73%

○ 위    치 : 연화마을 ～ 덕진파출소

○ 사 업 량 : L=880m

- 공사(2004이월사업 마무리) : 880m --- 800백만원

- 용지보상 : 2필지 500㎡ --------------- 300백만원

○ 확보예산: 1,100백만원(본예산300, ‘04이월800)

□ 이후계획

○ 도립국악원 ～ 녹두길(L=300m  B=35m)--  3,900백만원

동산고가교 접속도로 확장

□ 사업개요

○ 구    간 : 동산동 동산고가교 ～ 동산역(시의시도)

○ 사 업 량 : 연장  340m,   폭 18.5 ⇒ 35m

○ 사 업 비(시비) : 2,990백만원

○ 사업기간 : 2003 ～ 2006

□ 추진상황(공정 : 28.0% -- 투자액 : 840백만원)

○ 용지매입완료(10필지 779㎡)  ----------------  2003. 12

○ 동산가교～동산역 상행선 공사추진-------------- 2005.  3

《2005 추진계획》 ---  공정 85%

○ 위    치 : 동산고가교 ～ 동산역

○ 사 업 량 (공사) ; L=340m,  B=8.25m(반폭)

○ 확보예산 : 640백만원(‘04이월예산)

□ 이후계획

○ 동산고가교～동산역(L=340m,  B=8.25 - 반폭) -  2,150백만원

견 훤 로  개 설

□ 사업개요

○ 구    간 : 중노송동 마당재 ～ 교동 기린로(리베라 호텔앞)

○ 사 업 량 : 연장 1,650m,   폭 30m

○ 사 업 비(시비) : 27,000백만원

○ 사업기간 : 1999 ～ 2007(9개년)

※ 확보된 예산이 없어 2002. 5. 27일 공사중지

□ 추진상황(공정 51.0%  -  투자액 13,820백만원)

○ 개 통 : 마당재～기린봉ⓐ (L=560m ---  11,900백만원)  --   2001. 12

○ 용지매입완료 : 기린봉아파트～농원마을(L=220m 1,920백만원) -   2003. 12

《2005 추진계획》  ---  공정 : 30%

○ 위    치 : 기린봉ⓐ ～ 농원마을

○ 사 업 량(용지매입) : L=50m,

○ 확보예산 : 500백만원

※ 도시계획(로선)변경결정 검토중

□ 이후계획

○ 농원마을～기린로(L=1,090m) 보상 및 공사 - 12,680백만원

문 화 로  확 장

□ 사업개요

○ 구    간 : 중노송동 정보영상진흥원 ～ 전주고(시의시도)

○ 사 업 량 : 연장  220m,    폭 22⇒25m

○ 사 업 비 : 1,281백만원(시비 831,  민자 450)

○ 사업기간 : 2004 ～ 2005(2개년)

□ 추진상황(공정 72.0%  --  투자액 : 920백만원)

○ 전주고 구간 용지매입 완료-----------------------   2004. 07

○ 국유지무상관리환(4필지 205㎡)---------------   2004. 09

○ 공사 마무리(학교구간L=170m)----------------   2004. 12

《2005 추진계획》  ---  공정 : 84%

○ 위    치 : 진안사거리～정보영상진흥원

○ 사 업 량(용지매입 및 공사마무리) : L=20m,  B=22⇒25m

○ 확보예산 : 361백만원

□ 이후계획

○ 정보영상진흥원～진안사거리(L=30m, B=22⇒25m)  -  361백만원

태  평  로    확  장

□ 사업개요

○ 구    간 : 구 MBC사거리 ～ 대동길(시의시도)

○ 사 업 량 : 연장  900m,    폭 13 ⇒ 25m

○ 사 업 비 : 11,000백만원(양여금 6,600  시비 4,400)

○ 사업기간 : 2004 ～ 2008(5개년)

□ 추진상황(공정 7.0%  -  투자액 743백만원)

○ 편입토지등 보상(대동길～농협마트)  ----------------   2004. 12

《2005 추진계획》  ---  공정 :100%

○ 위    치 : 농협 하나로마트 ～ 구 연초제초장

○ 사 업 량(보상) : L=200m

○ 확보예산 : 500백만원

□ 이후계획

○ 보상 및 공사추진(대동길～구MBC L=900m)-  9,757백만원

남도주유소～고속터미널간 도로확장

□ 사업개요

○ 구    간 : 금암동 남도주유소～고속터미널간(시의시도)

○ 사 업 량 : 연장  500m,    폭 20⇒25m

○ 사 업 비 :8,000백만원(도로폭 축소시 4,900백만원)

○ 사업기간 : 2004 ～ 2008(5개년)

□ 추진상황

○ 도시계획변경(도로폭 축소) 절차이행 ----------------   2004. 12

《2005 추진계획》

○ 도시계획변경 결정(25⇒23m) --- 2005.6

- 지적고시 : 2005. 8

- 토지분할 및 용지보상추진 : 2005. 8

○ 확보예산 : 200백만원(‘04이월금)

□ 이후계획

○ 실시설계 용역  -------------------  2006. 1

○ 보상 및 사업시행   ----------------- 2006. 3

은 행 로  확 장

□ 사업개요

○ 구    간 : 남천교～동부시장(시의시도)

○ 사 업 량 : 연장 980m  폭 8 ⇒ 12m

○ 사 업 비 : 9,500백만원(교량가설비3,000백만원 포함)

○ 사업기간 : 2005～2006

□ 추진상황(공정 1.0%  --  투자액 : 200백만원)

○ 실시설계용역추진   ------------------------------   2004.10

- 도로폭원 결정협의 완료(한옥보존위원회자문, 주민설명회)

○ 도시계획시설 변경결정(폭 15 ⇒ 12m)추진--2005. 5

《2005 추진계획》

○ 도시계획변경 절차이행 완료 ------------------ 2005. 7

○ 확보예산 : 2,000백만원(시비)

※ 도시계획 변경결정후 편입토지등 보상추진-------- 2005. 8

□ 이후계획

○ 공사추진    ----------------------------  2006. 3

원대한방병원～가련교간 도로개설

□ 사업개요

○ 구    간 : 원대한방병원 ～ 가련교간(시의시도)

○ 사 업 량 : L= 1,250m    B= 35m

○ 사 업 비 : 27,015백만원

○ 사업기간 : 2005 ～ 2008

□ 추진상황(공정 1.3%/ 투자액 260백만원)

○ 기본 및 실시설계 마무리(260백만원) -------- 2003.11

《2005 추진계획》

○ 도시계획변경 결정(광장축소) --- 2005.6

- 지적고시 : 2005. 8

○ 토지편입등 보상추진 ----------- 2005. 7～12

- 사 업 량 : 용지매입(L=50m)

※ 확보예산 : 800백만원

□ 이후계획

○ 원대 한방병원～가련교간 사업추진(L=1,250m /25,955백만원)

※ 하가지구 택지개발 시행(토지개발공사) ------ 2005～2007

교통사고 예방을 위한

구조개선 및 안전시설물 정비

☞교통사고 줄이기 목표

- 자동차 1만대당 사망자 4.5인 ⇒ 2.0인(계획년도 2006년도)

- 자동차보험 지급율 및 손해율 전국의 80%이하 수준으로 개선

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 관내

○ 사업기간 : 2005.01 ～ 2005.12

○ 사 업 비 : 2,591백만원(국비 341.  시비 2,250)

○ 사업내용

- 교통안전시설 정비 및 차선도색외 5개사업 --- 1,525백만원

- 사고잦은지점 불합리한 교차로 구조개선 2개소  --- 50백만원(국비50%)

- LED 신호등 설치 22개 교차로 -------416백만원(국비)

- 위치부적정 신호등 이설 및 가로 안전시설물 집약화---600백만원

□ 추진실적

○ 교통안전시설 확충정비(6개사업 1,525백만원)

- 공사착공 ------------------------ 2005.03(공정 50%)

○ LED 신호등 설치사업(22개교차로 416백만원)

- 공사착공 ----------------------- 2005.05(공정 20%)

○ 교통사고잦은곳 구조개선사업(2개소 50백만원)

- 공사 설계중 -------------------- 6월중 발주예정

○ 위치부적정 신호등 이설 및 가로 안전시설물 집약화(600백만원)

- 공사착공 ----------------------- 2005.04(공정 40%)

□ 이후계획

○ 교통안전시설 확충정비 지속추진  ------------ 2005.12

○ LED신호등 설치사업 준공 ------------------ 2005.06

○ 사고 잦은곳 교차로 구조개선공사 지속추진---- 2005.12

어린이보호구역 개선사업

□ 사업 개요

○ 총사업량  :  중앙초교외 58개소

○ 사업기간  :  2003 ～ 2006

○ 사 업 비  :  10,100백만원(국비50%,시비50%)

○ ‘04년까지 추진 :  6개초교  1,460백만원

○ ‘05년 계획  :  37개 초등학교 5,890백만원

ㆍ 이월사업 :  9개교   890백만원

ㆍ 본 예 산 :  6개교 1,000백만원

ㆍ 추경예산 :  6개교 1,200백만원

ㆍ 예산미확보 : 16개교 2,800백만원

□ 추진 실적

○ 완  공 : 9개초교(이월사업)

○ 공사중 : 6개초교(조촌,서일,진북,서신,팔복,기린)

□ 이후 추진계획

○ 6개 초등학교(조촌,서일,진북,서신,팔복,기린) : 2005. 8월말 완공

○ 추경사업 6개교(완산서,서천,효자,동신,전주동,금평)

- 조사 및 측량 : 2005. 7월

- 관할경찰서 협의 및 지역주민,학부모 의견수렴 : 2005. 8월

- 설계 및 발주 : 2005. 8월~9월

- 공사 시행 : 2005. 9월 ~ 11월

※ 예산확보후추진 : 16개교 2,800백만원

(국비 1,400- 확보, 시비 1,400- 시비 부담액 미확보)

자전거도로 확충

□ 사업개요

○ 사 업 량 : 자전거도로 99개노선 325㎞

(자전거도로 135. 기타사업 190)

○ 사업기간 : 1997 ～ 2006년(10개년)

○ 사 업 비 : 32,500백만원

□ 추진실적

○ 2004년까지 자전거도로 251㎞(예산사업 105, 비예산사업146)

○ 사 업 비 : 263억원(예산 133,  비예산 130)

□ 이후계획

○ 완주공단 진입로 자전거도로 개설공사

- 위    치 : 송천동 송천육교 ~ 회포대교(백석로)

- 사 업 량 : L=3,570m

- 사 업 비 : 2,364백만원(’04예산 691, ’05예산 1,673)

- 기    간 : ’05. 11월 말

○ 레저 자전거도로 확충

- 위    치 : ’03년 시행한 동서학동 중바위길(1.7km) 연계 순환코스 추진

- 사 업 비 : 610백만원(국305, 시305)

- 기    간 : ’05. 11월 말

중앙 분리대(화단) 설치

중앙분리대(화단) 설치로 중앙선 침범과 무단횡단으로 인한 교통사고를

예방하여 고귀한 생명과 재산을 보호하고 녹색환경 도시건설

□ 사업개요

○ 설치대상 : 4차선이상 도로(경전철 예정노선 제외)

○ 사 업 량 : 49개 노선  68.9㎞

○ 사 업 비 : 15,000백만원(국 7,500.  시 7,500)

○ 사업기간 : 2002 ～ 2006

□ 추진실적

○ 중앙분리대 정비계획 수립 ---------------------- 2003.06

○ 아중로등 10개 노선 19.2㎞ 설치완료

- 투자사업비 : 5,657백만원(국 2,607.  시 3,050)

□ 이후계획

○ 위    치 : 노동청앞 신덕1길외 2개노선

○ 규    모 :  L=2㎞

○ 사 업 비 : 868백만원(국 434   시 434)

○ 기    간 : ‘05. 9월착공(11월말 준공예정)

※ 당초 월드컵로의 한전 지중화사업와 병행 시행 할 계획을

지중화사업추진 지연으로 노선변경 시행

자전거타기 활성화

○ 폭증하는 자동차 1천4백만대 시대의 심각한 도시교통 및 환경,

에너지문제 개선

○ 자전거이용의 생활화로 녹색환경도시 건설의 시민의식 전환

ꏚ 추진실적

○ 주말자전거 테마여행 실시 : 6회 780명

○ 주부 초보자 자전거교실 운영 : 체련공원(80명)

○ 자전거동호회연합 자전거대행진 : 2005. 5. 7(토) 2,000명

○ 초․중학생 자전거 안전교육 실시 : 3개교 600명

○ 자전거타기 활성화 홍보용 전단제작 : 6,000매

ꏚ 이후계획

○ 주5일 근무에 따른 주말 자전거테마여행 변경시행

- 첫째, 셋째주 금요일(14:30～17:00)로 변경 추진

○ 자전거타기운동 활성화 지속추진 : 시범학교, 자전거테마여행 운영 등

- 자전거동호회 : 매주 1회 자전거타기 실시

○ 주부 초보자 자전거교실 운영 : 1개소(체련공원)

○ 자전거이용 시범학교 지정운영 : 25개교(중학교 18, 고등학교 7)

○ 자전거 테마여행 지속실시 :  7회

○ 하반기 전주시민 자전거 대축제 실시 : 2005.10월중

○ 누구나 손쉽게 이용할 수 있는 자전거 관련 홍보

- 언론홍보(MBC TV, 라디오)

- 더불어사는전주 게제 홍보 및 자전거 관련 전단배부

서남권 국도대체우회도로 개설

국가사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 완주군 상관～구이～이서～용정～익산시 춘포

○ 사업규모 : 33.4㎞(폭 20m)

○ 사 업 비 : 4,864억원(국비 4,586억  시비 278억)

○ 사업기간 : 1998 ～ 2010년(13년)

○ 시 행 청 : 익산지방국토관리청

□ 추진실적

○ 총 공 정 : 63.5%(공사 62%  보상 65%)

○ 투자실적 : 2,699억원(국비 2,505  시비 194)

- 2005년 예산확보 : 165.8억원(국비 144.8  시비 21)

○ 상관 ∼ 구이간 L=8.9㎞ 개통(’05.4.20일)

□ 이후계획

○ 3개공구 보상추진 : 367,590㎡(111,196평) / 276필지

- 구이～이서 :  28,749㎡( 8,697평) /  71필지

- 이서～용정 :  64,986㎡(19,658평) /  65필지

- 용정～춘포 : 273,855㎡(82,841평) / 140필지

○ 이서~용정 L=3.6㎞ 포장 및 부대시설공사

○ 용정~춘포 만경강교 강교거치 및 스라브 철근조립

○ 갈동유적지 현장보존에 따른 선형변경(L = 2.3㎞)

➲ 2006년 예산확보 계획 : 총 565억원(국비 535억, 시비 30억)

북부권 국도대체우회도로 개설

국가사업

□ 사업개요

○ 사업구간 : 조촌 용정～아중역(금회)～동서학동 색장리(장래)

○ 사업규모 : 연장 18.6㎞(폭 20m)

○ 사업기간 : 2003 ～ 2011년(9년)

○ 사 업 비 : 약3,040억원(국비 2,790  시비 250)

○ 시 행 청 : 익산지방국토관리청(보상 : 전주시)

□ 추진실적

○ 기본 및 실시설계 용역중(37억원) --- 2003.07~2005.07

○ 노선확정 --------------------------- 2004.11

- 조촌 용정～용진～산정동～아중역(제방도로 이용) 18.6㎞

※ 우리시에서 요구한 노선으로 확정

○ 환경․교통․재해영향평가서 초안 공람공고 및 주민

설명회 개최(2005. 1.18)

□ 이후계획

○ 기본 및 실시설계 용역 완료 ----------------- 2005.08

○ 공사착공 ----------------------------------- 2005.12

➲ 2006년 예산확보 계획 : 총 149억원(국비 140억, 시비 9억)

교 통 과  소 관

ꊱ	전주경전철 건설로 도시교통 문제 해결 ----	46
ꊲ	시내버스정보화(BIS) 구축사업(2단계) ----	47
ꊳ	교통신호체계 통합 및 정보센터 장비보강 --	48
ꊴ	교통정체지역 소통개선 -------------------	49
ꊵ	녹색주차마을(Green Parking)시범 조성 -	50
ꊶ	주차수급실태 조사 용역 ------------------	51
ꊷ	전국단위 표준 노드/링크 DB 연계구축 ----------	52
ꊸ	버스업계 경영개선으로 서비스 극대화 -----	53

전주경전철 건설로 도시교통문제 해결

○ 자동차의 급증과 도로시설 공급의 한계로 인하여 계속 심화되고 있는

도심지역의 심각한 교통난 해소 및 고품질의 대중교통서비스 제공

- 정시성, 안전성, 대량수송이 가능한 무공해 신 대중교통수단 도입 -

□ 사업개요

○ 시스템 및 노선연장 : 노면전차(Tram) 24.29㎞

- 1단계 : 송천역～한방병원～팔달로～평화광장～삼천농협공판장(14.19㎞)

- 2단계 : 전주역～백제로～곰솔나무길～평화광장～평화 3지구(10.10㎞)

○ 사 업 비 : 4,671억원(국비930 도비465 시비487 민자2,789)

○ 사업기간 : 2001～2013(13년간)

○ 개통목표 : 1단계 2010년,  2단계 2013년

□ 추진실적

○ 도시철도기본계획승인요청(전주시⇨전라북도) ---- ’04.07.07

○ 전주경전철 기본설계용역 계약(동명기술공단) ---- ’04.12.09

○ 도시철도기본계획승인요청(전라북도⇨건설교통부) ---- ’04.12.24

□ 이후계획

○ 도시철도기본계획 승인 및 민간투자대상사업 지정․고시 ---- ’05.08

○ 민간투자시설사업 기본계획 고시(사업자 모집 공고) ---- ’05.10

○ 전주경전철 기본설계 준공 ----------------------- ’05.10

○ 민간투자자 사업제안서 접수 및 협상 -------- ’06.03～08

○ 중앙 민간투자사업 심의위원회 심의 확정 --------- ’06.08

○ 사업자 시행자 지정 및 실시협약 체결 ------------ ’06.09

○ 실시설계승인 및 사업착공 ----------------------- ’07.10

○ 1단계 사업완료 및 2단계 사업착공 -------------- ’10.06

시내버스정보화(BIS) 구축사업(2단계)

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2005.06~2006.02

○ 사 업 비 : 8,448백만원(2005예산 1,300백만원 확보)

○ 사업내용 : 정류장안내기 30개, 노변기지국 40개,

노선번호표시기 310개 등

□ 추진실적

○ 1단계 사업 완료 ---------------- ’03.10.06~’04.08.30

구 분		계	2004까지 (1단계)	2005 (2단계)	2006 (3단계)
사업예산(백만원)		8,448	3,648	1,300	3,500
사업규모	정류장안내기(개)	284	104	30	150
	노변기지국(개)	390	193	40	157
	노선번호표시기(개)	404	94	310	-
	차량내안내기(개)	404	94	-	310
	버스단말기(개)	410	410	-	-
	차량통신장치(개)	410	410	-	-

○ 2단계 사업자 선정 및 계약체결 -------------- ’05.06.09

- 사업자 : 한전KDN(주)

○ 사업착수 ----------------------------------- ’05.06.16

□ 이후계획

○ 시스템 구축 ---------------------------- ’05.06~12

○ 시험운영 ------------------------------- ’05.12~’06.02

○ 사업완료 ------------------------------- ’06.02

교통신호체계 통합 및 정보센터 장비보강

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2004.12～2005.12

○ 사 업 비 : 4,400백만원 (국비)

○ 사업내용

- 이원화된 신호운영체계 통합시스템 구축 1식

- 교통신호제어기 교체 149대, 신호연동화 1식

- CCTV 3개소 설치, 광케이블 회선 확장 1.8㎞

- 안전교육실 신설 1식

□ 추진실적

○ 기본설계 ------------------------------ ’04.02～’04.05

○ 사업착수 (사업자:(주) 케이티 컨소시엄) --- ’04.12～’05.06

- 신호운영 제어장치 개발

- 신호제어기 공인기관시험 및 생산

- 광케이블 1.8㎞ 및 CCTV 기초 3개소

- 신호연동화 교통량조사 323개소

- 신호제어기교체 24대 및 검지기교체 20개소

※ 6.30현재 전체 공정율 : 38%

□ 이후계획

○ 신호운영 통합시스템 구축(신신호, 전자신호) --- ’05.06～’05.09

○ CCTV 설치 3개소 및 상황판 교체 ----- ’05.06～’05.09

○ 안전교육체험실 시설 ------------------- ’05.06～’05.10

○ 시험운영 및 사업완료 ------------------ ’05.10～’05.12

교통정체지역 소통개선

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2005.06~2006.05

○ 사 업 비 : 500백만원(신호운영300, 무인단속카메라200)

○ 사업내용

- 교통신호운영체계 기술운영 및 DB구축

- 상습정체구간 교통소통대책(현황조사, 분석 및 기하구조 개선방안 모색)

- 상습불법 주정차지역 무인단속 카메라 설치

□ 추진실적

○ 상습정체구간 소통개선 용역 및 운영 ------ ’04.06~’05.06

- 상습정체구간 7개노선(75개 교차로) 교통운영관리

- 주요교차로 교통량 조사(215개 교차로)

- 가로축 연동개선(319건), 교차로 신호운영개선(363건)

- 상시 신호운영개선(민원처리 148건)

○ 1단계 무인단속카메라 설치(3개소) ---------- ’05.03.25

- 충경로 네거리, 오거리 국민은행앞, 전북대 구정문 앞

○ 2단계 무인단속카메라 설치(6개소) ---------- ’05.04~07

- 코아백화점앞, 객사앞, 안행교네거리, 안골네거리,

서신동 풍년제과앞, 서신동 이마트앞

□ 이후계획

○ 2단계 불법주정차 무인단속카메라 설치공사 완료 --- ’05.07.23

○ 2005년도분 교통소통 개선운영 용역 발주시기 조정(’06.01월 시행)

- 교통정보센터 장비보강사업(자특)에서 관련업무 추진

녹색주차마을(Green Parking)시범 조성

	필 요 성
○ 주택가 주차문제 해결, 생활환경 개선, 교통안전 등을 종합적으로 접근한 주차 표준모델로 조성하여 시민 삶의 질 향상 - 내집 주차장 설치 + 담장허물기 + 녹지공간 확충 + 이면도로 정비 ⇨ 사업계획 단계부터 사후관리까지 주민 주도로 의사결정을 함으로써 지역 커뮤니티 활성화

□ 기본방향

○ 주차수급실태 분석을 기초로 구청별 1개소씩 시범 조성

○ 주민여론 전수조사, 추진협의체 구성 등 주민 주도로 사업시행

○ 주거환경 개선과 교통안전을 도모하면서 주차공간 100% 확보

○ 보행위주의 도로정비 및 지역특성을 살린 가로 조경 조성

□ 추진실적

○ 추진체제 구축 및 사업시행 매뉴얼 작성 ----- ’05.03～04

○ 사업추진 대상지구 조사 -------------------- ’05.05～06

- 완산 : 효자2동, 삼천1동, 한옥마을

- 덕진 : 덕진동(2개소), 진북2동

□ 이후계획

○ 사업추진 대상지구 선정(선정심의위원회) ---- ’05.07

○ 시범지구 주민협의체 및 유관기관 협의체(경찰, 한전, 소방서,

상수도, 도시가스 등) 구성 ----------------- ’05.07

○ 실시설계 추진(150백만원) ----------------- ’05.08～12

- 관련계획 검토 및 현황조사, 주차수급 및 교통체계 분석

- 주차구획 정비 확충 및 도로기능 재조정 계획

주차수급 실태조사 용역

	필 요 성
○ 주차장의 설치 및 관리를 위한 기초 자료로 활용하기 위하여 정기적으로 주차장 수급실태조사 의무 규정 (주차장법 제3조 : 2003.12.31 신설) ○ 그 동안 주차장 수급실태에 대한 정확한 기초 자료가 없어 공공주차장 건설, 주택가 주차관리 등 체계적인 주차정책 추진에 애로

□ 실태조사 내용

○ 행정구역, 용도지역, 용도지구 등을 고려한 조사구역 설정

- 조사구역 경계선이 300m이내의 사각형 또는 삼각형 형태

- 조사구역은 건축법규정에 의한 도로를 경계로 구분

○ 주차수요와 주차시설 현황을 구분하여 실태조사

○ 주차수급 실태조사의 주기는 매 2년마다 조사

□ 추진실적

○ 자료수집 및 타 도시 비교견학 -------------- ’05.05～06

○ 주차수급 실태조사 용역 과업지시서 작성 ---- ’05.06

□ 이후계획

○ 주차수급 실태조사 용역실시

- 과업대상 : 전주시내 전 구역

- 과업기간 : 2005.07～2006.04월(10개월간)

- 소요예산 : 150백만원

○ 조사용역 결과에 따라 블록별 주차 정책 추진

- 주차장확보율이 낮은 구역은ꡒ주차환경 개선지구ꡓ로 지정

사업우선 시행

- 지역별, 연차별 공공주차장 확충계획 수립

- 그린파킹제, 거주자우선주차제 등 구역별 특성에 맞는 사업시행

전국단위 표준 노드/링크 DB 연계구축

○ 전국 고속국도 및 국도, 지방도의 표준 교통망(노드/링크)구축

사업과 연계하여 현장조사를 통한 국도, 지방도의 표준 노드/

링크 DB 사업추진

- 현재 지자체별로 노드/링크 ID 체계를 구성하여 이용하고

있으며, ID를 구성하는 속성을 포함하여 ID체계가 각각

달라 교통정보 교환이 원활하게 이루어지지 못하고 있는 실정임

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2005.02~2005.12

○ 사 업 비 : 198백만원(국비)

○ 사업내용

- 관할행정구역내 6m이상의 모든 도로에 대하여 표준 교통망

(노드/링크) ID 및 기본 속성 부여

- 구축된 DB를 건교부 교통종합정보센터와 연계하는 시스템 구축

□ 추진실적

○ 사업비 신청 및 국보보조 결정(건설교통부) ---- ’04.11

- 전국 교통정보센터 설치된 지자체(12개 시도)

○ 협약서 체결(전주시 ⇔ 건교부) -------------- ’04.11.10

○ 사업관리분야 계약체결(국토연구원) ---------- ’05.05.31

□ 이후계획

○ 표준 노드/링크 DB구축 사업자 선정 -------- ’05.07

○ 사업완료 ----------------------------------- ’05.12

버스업계 경영개선으로 서비스 극대화

□ 사업개요

○ 재정지원 : 2,894백만원(도비947  시비1,947)

○ 대․폐차지원 : 80대 400백만원(대당 5백만원/시비)

○ 유가보조금 : 20,500백만원

- 본예산 : 6,000백만원     - 1회 추경 : 14,500백만원

□ 추진실적

○ 재정지원금등 지원금 적기 지원

- 적자노선 재정지원금 : 5개사 536백만원

- 노후차량 대․폐차 지원금 : 26대 130백만원

- 벽지노선 손실보상금 지원 : 6개노선 14백만원

- 시외버스 터미널 정비사업 지원 : 124백만원

○ 버스업계 유가보조금 지원

- 지원실적 : 9개사 2,458백만원(2005. 2월분까지)

※ 소요예산 결산추경 확보 ⇨ 6,500백만원 추가 소요

□ 이후계획

○ 시내버스 경영분석 용역 ---------------- ’04.12∼’05.10

- 경영수지 실태조사, 표준원가 산정, 경영합리화 방안 제시 등

○ 이용자 및 운전자 편의를 위한 회차지 정비사업 추진 -- ’05.07～’05.10

- 소요예산 : 50백만원(노면 덧씌우기30, 화장실 신축20)

○ 시내버스 노선조정 및 환승제 도입 ------ ’05.07～’06.02

하 수 과  소 관

①	하수처리장 1‧2단계 고도처리사업 --------	55
②	하수처리장 슬러지처리 시설사업 ----------	56
③	하수처리장 민간위탁 관리 ----------------	57
④	화산․덕진처리구역 하수관거 정비사업 -----	58
⑤	농촌마을 하수도 정비사업 ----------------	59
⑥	하수관거정비(BTL)민간투자사업 ------------	60
⑦	삼천 자연형하천 조성사업 -------------------	61
⑧	만경강 생태하천 가꾸기사업 -----------------	62
⑨	전주천 자연형하천 정화사업 -----------------	63
⑩	만경강수계치수 중복천 개수공사--------------	64
⑪	지방2급 하천정비기본계획수립 용역-----------	65
⑫	재난 방재 업무추진 ------------------------	66

하수처리장 1‧2단계 고도처리사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 송천동 2가 환경사업소 내

○ 사업규모 : 303천톤/일

○ 사업기간 : 2002.03 ～ 2007.04

○ 총사업비 : 60,000백만원(국 30,000  지 30,000)

- 연도별 투자계획                        (단위 : 백만원)

재원별	총 사업비	2004 까지	2005 계획	2006 이후	비 고
계	60,000	29,560	747	29,693
국 비	30,000	17,615	498	11,887
지방비	30,000	11,945	249	17,806

○ 사업내용 : 고도처리공법 시설개선(표준활성법 ➪ CNR공법)

※ 주요 수질기준

구 분	BOD	COD	SS	T-N	T-P	비 고
당 초	20	40	20	60	8
변 경	10	20	10	20	2

□ 추진실적

○ 기본계획 및 입찰안내서 작성 용역 ----- 2002.06～2003.10

○ 턴키방식의 설계적격심의 완료 ----------------- 2004.09

○ 공 사 착 공(30개월)  ------------------------ 2004.10

○ 공동구, 방류펌프장 터파기 및 파일박기 완료  --  2005.06

□ 이후계획

○ 고도처리 공정(2단계 200천톤/일)  ------------- 2005.10

○ 고도처리 공정(1단계 103천톤/일)  ------------- 2006.10

○ 전기, 기계, 계장설비 --------------------------  2007.02

○ 사 업 준 공  ----------------------------------  2007.04

하수처리장 슬러지처리 시설사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 송천동 2가 환경사업소내

○ 사업규모 : 150톤/일

○ 사업기간 : 2003 ～ 2007.12

○ 총사업비 : 14,000백만원(국비 7,000  지방비 7,000)

※ 2005년 예산 : 4,883백만원(국비 3,983  지방비 900)

□ 추진실적

○ 전주시 설계자문회의  -----------------------  2003.03

○ 관계전문가 자문(전주시 자문위원 전문가 9명) -- 2004.06

○ 기본 및 실시설계(진도 60%,용역중지중) ----- 2004.12

□ 이후계획

○ 실시설계 완료 ------------------------------  2005.10

○ 환경성검토 및 실시계획인가등 행정절차 이행 --- 2005.12

○ 슬러지 처리시설 착공 ------------------------ 2006.03

○ 공사준공 및 운영  --------------------------- 2007.12

하수처리장 민간위탁 관리

□ 현  황

○ 위    치 : 전주시 덕진구 송천동 1130번지 일원

○ 규    모 : 403,000㎥/일

○ 기    간 : 2004. 12. 1 ～ 2024. 12(20년간)

○ 민간위탁 운영비

- 7,644백만원(하수처리장6,864, 위생처리장480, 대수선300)

※ 사용료지급 : 3,120,307천원(하수 2,411,609천원 분뇨 80,027천원)

□ 추진실적

○ 운영수질                                     (단위㎎/ℓ)

항목 구분	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균	비고
1․2단계	14.1	24.6	11.9	13.49	1.02	500
3단계	4.5	10.5	3.1	9.4	0.2	30

○ 1,2,3단계 유입, 방류유량계(9개소)검․교정실시-- 2004. 12. 1    ○ 하수처리 기준사용료 조정(45.48원/㎥→45.27원㎥)-2005. 02.04

○ 방류수질검사의뢰: 3회(시정명령 1회: 대장균초과)

□ 이후계획

○ 하반기중 차집관로 전주천, 삼천천등 차집관로 및 우수토실 일제정비

○ 강우시 민간위탁업체 주야간 비상근무체제로 운영

○ 매월 1회이상 민간위탁 운영실태 점검으로 사고예방

화산 ․덕진처리구역 하수관거 정비사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 화산처리구역 1․4․7분구, 덕진처리구역 1분구

○ 사업규모 : 관거정비 70㎞

○ 사업기간 : 2004.03 ～ 2008.04

○ 사 업 비 : 39,728백만원(국 19,864  시 19,864)

※ 2005년 예산 : 16,998백만원(국 9,294  시 7,704)

□ 추진실적

○ 기본 및 실시설계 완료 --------------------- 2003.09

○ 시공업체선정(조달청) 및 착공 -------------- 2004.04

○ 관련 주민 사업설명회 개최 ----------------- 2004.06

○ 1,2차공사 (동서학동 산성천주변, 덕진동 호반촌)-- 90%

- 관거정비 L= 5.2Km, 배수설비 288세대

○ 3차공사 시행(전북대병원 주변) --- 5%

- 관거정비 L= 12.5Km, 배수설비 758세대

□ 이후계획

○ 1,2차 공사구간 완료  ---------------------- 2005.09

○ 사 업 준 공 ------------------------------- 2008.04

농촌마을 하수도 정비사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 관내 농촌마을

○ 사업대상 : 3개마을(동서학동 내․외원당, 객사)

○ 사업규모 : 하수관거정비 L= 8.5Km

○ 총사업비 : 2,272백만원(국 1,135  지 1,137)

- 연도별 추진계획                             (단위: 백만원)

재원별	총 사업비	2005 계획	2006 계획	비 고
계	2,272	735	1,537
국 비	1,135	476	659
시 비	1,137	258	878

○ 사업기간 : 2005～2007(3개년)

□ 추진실적

○ 전수 실태조사  -------------------- 2004.05～2004.07

○ 사업적정 후보마을 선정(3개소 5개마을) ------  2004.09

○ 사업계획 확정 통보(환경부) ------------------ 2004.12

○ 기본계획 및 실시설계 용역발주  -------------- 2005.04

- 기초자료조사 및 현황측량 완료 (공정 20%)

□ 이후계획

○ 기본계획 및 실시설계 용역완료 --------------- 2005.10

○ 공사발주 및 착공 ---------------------------- 2005.11

○ 공  사  완  공 ------------------------------ 2007.12

하수관거정비(BTL)민간투자사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 일원(덕진, 아중, 중앙, 화산, 효자처리구)

○ 사 업 량 : 하수관거 정비(우․오수 분리) L = 127Km

○ 사 업 비 : 1,175억원정도

○ 사업기간 : 2005 ～ 2009(40개월)

○ 사업방식 : 준공후 전주시에 기부체납하고 정부지급금(시설임대료 및 운영비)을 20년간 지급하는 BTL 방식

□ 추진사항

○ 일반건설 및 전문건설협회 자문 ----------------- 2005. 4. 12

○ 시의회 도시건설위원회 간담회 ------------------ 2005. 4. 12

○ 시정조정위원회  ------------------------------- 2005. 4. 13

○ 결과를 종합하여 참여의견서 제출(시→환경부)  --- 2005. 4. 18

○ 기본계획 등 자문위원회 개최(환경관리공단)    --- 2005. 5. 19

○ 사전 환경성검토 협의(시↔전주지방환경청)    --- 2005. 5. 23

○ 환경시설 민자사업 심의위원회(환경관리공단)  --- 2005. 5. 25

○ 도비지원요청 및 지원계획 통보(시↔도)       --- 2005. 6. 03

○ 국비보조율 상향조정요청 및 보조율 제고노력 통보(시↔환경부) -- 2005. 6. 03

○ 민간투자사업에 관한 협약체결(환경부, 도, 시, 환경관리공단) -- 2005. 6. 09

○ 전주시 하수관거정비 BTL 민간투자사업 시설사업기본계획고시(시) --- 2005. 6. 17

○ 사업계획서 작성요령 설명회(환경관리공단)   -----  2005. 6. 24

□ 이후계획

○ 민간사업자 사업계획서 평가 및 우선협상대상자 선정-- 2005. 10.

○ 최종 사업자선정 및 Fast-Track에 의한 공사착공 --- 2005. 11.

○ 시설사업 실시계획 승인(환경부)  ---------------- 2006. 06.

삼천 자연형하천 조성사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 삼천동 삼천교 ～ 추천대교

○ 사업규모 : 8.05㎞

○ 사업기간 : 2001 ～ 2006(6개년)

○ 총사업비 : 13,068백만원(양여금5,029 국비2,812 시비5,227)

○ 연도별 투자계획                              (단위 : 백만원)

재원별	총 사업비	2004까지	2005계획	2006이후	비 고
계	13,068	8,229	2,400	2,439
국 비	7,841	5,029	1,165	1,647
시 비	5,227	3,200	1,235	792

□ 추진실적

○ 공사착공 ------------------------------------- 2001.12

○ 차집관로(오수관) 매설  1.4㎞ ----------------- 2002.09

○ 낙차공개량 및 어도설치  3개소 ---------------- 2003.07

○ 수질정화습지 1개소, 자연석쌓기 2.83㎞ --------  2004.12

○ 자전거도로 개설  5.7㎞  -----------------------  2004.12

○ 공사중 : 자전거도로(좌안), 휴게소및체육시설, 징검다리, 계단등

□ 이후계획

○ 4차분 공사시행 준공 ------------------------- 2005. 7

○ 5차분 공사계약 추진 시행--------------------- 2005. 7

※ 자연형 호안,산책로겸자전거도로,운동시설,진․출입로,물억새 식재등 추진중

만경강 생태하천 가꾸기사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 팔복동 추천대교 ～ 만경강 합류

○ 사업규모 : 7.9㎞(전주천 5.7㎞  만경강 2.2㎞)

○ 사업기간 : 2001 ～ 2010(10개년)

○ 총사업비 : 16,637백만원

( 국비 10,257  양여금 515  도비 598  시비 5,267)

○ 연도별 투자계획                                      (단위 : 백만원)

재원별	총사업비	2004까지	2005계획	2006이후	비 고
계	16,637	3,898	646	12,093
국 비	10,772	3,078	323	7,371
도 비	598	258	-	340
시 비	5,267	562	323	4,382

□ 추진실적

○ 하천개수 별도추진사업 완료(1,9㎞) ------------- 2003.12

○ 공 사 착 공 ----------------------------------- 2004.11

○ 산책로겸자전거도로개설(추천대교～미산교까지추진 7.0㎞) -- 2005.6

○ 자연형 호안공사(추천대교～한양@앞 좌,우안 2.5㎞)--- 2005.6

□ 이후계획

○ 2차분 공사 계약 추진 -------------------------- 2005. 8

○ 자연형 호안공사(저수호안 조경석쌓기) 1.5㎞ ---- 2005.11

○ 산책로겸 자전거도로(만경강까지 좌, 우안) 6.2㎞

전주천 자연형하천 정화사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 교동 한벽보 ～ 덕진동 삼천합류점

○ 사업규모 : 7.2㎞

○ 사업내용 : 수질개선, 하천유지용수 확보, 친수시설 보완

하천 생태계 복원(어도개량)

○ 사업기간 : 2005 ～ 2006(2개년)

○ 총 사업비 : 1,543백만원

○ 연도별 투자계획                                (단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	2005 계획	2006 이후	비 고
계	1,543	575	968
국 비	1,080	345	735
시 비	463	230	233

□ 추진계획

○ 전주천자연형하천 정화사업실시설계 용역계약시행 --- 2005. 4

- 징검여울, 소, 어도 등 생태환경 개선 및 보완

- 수생식물 식재, 징검다리 보수․보강

○ 전주천 자연형하천 정화사업 착공 --------------- 2005. 9

○ 사업 준공  ------------------------------------ 2006.12

만경강수계치수 중복천 개수공사

□ 사업개요

○ 위    치 : 삼천동 쑥고개길아래 ～ 효자동 삼천합류점

○ 사업규모 : 3.5㎞

○ 사업내용 : 축제및호안 5,333m, 교량가설 10개소,

보 및 낙차공 4개소, 기타 시설물등

○ 사업기간 : 2004 ～ 2009(6개년)

○ 총 사업비 : 21,500백만원

○ 연도별 투자계획                                (단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	2004까지	2005 계획	2006 이후	비 고
계	21,500	100	2,000	19,400
국 비	21,500	100	2,000	19,400

□ 추진실적

○ 중복천개수 위․수탁공사 협약 체결(익산청) ----- 2003.12

○ 보상계획 및 열람계획 공고 --------------------- 2004. 4

○ 토지 및 지장물 감정평가의뢰 ------------------- 2004. 4

□ 이후계획

○ 설계도서 검토승인(익산청) 및 하천공사 시행계획고시--  2005. 7

○ 1차분 공사시행 및 감리용역시행 ---------------- 2005. 9

지방2급 하천정비기본계획수립 용역

□ 사업개요

○ 대상하천 : 지방2급 24개 하천 중 19개 하천

○ 하천연장 : 52.1㎞

○ 사 업 비 : 2,024백만원(도비1,012  시비1,012)

○ 사업기간 : 2005 ～ 2010(6개년)

※ 2005년 예산 : 714백만원(1회추경 494, ’04명시 220)

□ 추진상황

○ 하천정비기본계획 수립하천(5개소) : 하천개수공사 시행

하 천 명	사업비(백만원)	시 행	사업기간	비 고
조 촌 천	14,208	익 산 청	‘03.07～’07.12
중 복 천	21,500	익 산 청	‘05.03～’09.12	수탁 사업
조 경 천	1,289	수익자 부담	‘05.03～’07.12	일부 시행
아 중 천	3,800	건교부 (하도준설)	‘04.12～’07.12	용역시행중 환경부 오염하천정화사업 반영 건의
덕 적 천	5,893			건교,환경부 건의

□ 이후계획

○ 하천정비기본계획 용역설계(독배천외 6개하천) --- 2005. 7

○ 하천정비기본계획 용역설계 사전심사 -------------- 2005. 7

○ 하천정비기본계획 용역설계 착공 ------------------ 2005. 9

재난 방재 업무추진

□ 현 황(2005. 6월 현재)

○ 특정관리대상시설

구 분	총 계	중점관관리대상시설				재난위험시설
		소계	A등급	B등급	C등급	소계	D등급	E등급
합 계	1,243	1,228	1,116	67	45	15	14	1
건축물	1,216	1,202	1,108	58	36	14	13	1
시설물	27	26	8	9	9	1	1	0

○ 재난기금 관리 현황

(단위 : 백만원)

구 분	‘05년6월 현재액	‘05년 기금현황		‘06년이월예정액	미확보액
		조성액	집행예정액
재난관리기금	6,875	1,786	800	7,025	502(99년)

○ ’05년 상반기 기상특보 및 인위 재난발생

강 풍	호우특보	화 재	윤 화	기 타
2	1	189	1,639

□ 상반기 주요업무 추진실적

ꊱ 해빙기, 우기대비 안전점검  및 위험시설 정비

○ 점검대상 : 하천, 저수지, 주택 절개지, 옹벽, 기타

○ 점검결과 : 9개소(도로절개지 2, 공원절개지 2,

하천(하수포함) 3, 기타 2) 정비 및 보수보강 요망

○ 보수보강 : 신속한 보수보강으로 여름철 우기대비

-  재난관리기금 등 745,000천원 투입 사업추진

ꊲ 2004년 호우피해 복구

○ 호우피해(2004.6.19~6.21) 발생에 따른 복구

- 사 업 비 : 688백만원( 국비 116,도비 228,시비 344)

- 중인동진밭뜰 농로 교량공사, 독배천 개량공사 : 공사완료

ꊳ 재난대비 훈련 및 홍보

○ 재난대비 실제훈련 : 6. 23 서신동 소재 지리산 빌딩

- 소방서, 군부대, 경찰서 등 유관기관 합동으로 서신동 지리산 빌딩에서 시행

○ 국가재난대응 조합훈련(CPX) : 4. 20 ~ 4. 22

- 피해발생에 따른 응급복구, 구조활동, 복구계획 수립 등

국가재난관리시스템 NDMS를 이용한 전산 및 실제훈련

○ 안전점검의 날 행사 : 매월 4일 객사앞 등에서 6회 시행

○ 재난 홍보 달력 제작(1,600부) : 유관기관, 시민등 배포

ꊴ 재난상황실 운영

○ 기    간 : 5.15 ~ 10.15 (5개월)

○ 운영방법 : 상황 근무자 2명 24시간 교대운영

○ 장마철 재해대책 추진과 재난 발생시 신속한 상황 대처

ꊵ 안전관리 계획 수립 및 표준행동메뉴얼 제정

○ 근거 : 재난및안전관리기본법 제25조

○ 내용 : 자연 및 인적재난으로부터 시민의 생명과 재산을 보호하기 위한 안전관리에 관한 종합계획

○ 활용 : 담당부서, 유관기관 등 재난관리책임기관 세부집행계획임 - 책자발행 하여 교부

□ 하반기 주요업무 추진계획

ꊱ 여름철 방재기간 재해대책 강화

○ 태풍, 호우에 신속하게 대응하고 피해발생시 응급복계 체계 유지 및 소방서, 경찰서 등 유관기관과 협조체계 유지

ꊲ 동절기 방재기간 운영

○ 설해대책기간 운영으로 시민 피해 및 불편 최소화

ꊳ 사전 안전점검

○ 하계휴가철, 추석맞이, 동절기 대비 각종 시설에 대한 사전 안전점검 시행으로 사전 대비

ꊴ 기초생활 수급대상자 생활안전시설 개선사업

○ 사업비 : 41백만원

○ 전기, 가스시설에 대한 380세대 개선사업 시행

도시발전기획단 소관

ꊱ	전주서부신시가지 도시개발사업 -----------	69
ꊲ	35사단 이전 ----------------------------	70
ꊳ	전주도시첨단산업단지 조성 ---------------	71

전주서부신시가지 도시개발사업

□ 사업개요

○ 사업규모 : 기반조성 76만평, 교량 3개소

○ 사업기간 : 1999 ~ 2007

○ 사 업 비 : 4,185억원

□ 추진실적

○ 기반조성공사 추진: 1,117 억원( 1차 146, 2차 491, 3차 480)

- 경찰청주변 기반조성공사 완료,   매립 쓰레기 처리 등

- 도청주변 5 개로선  3.5 Km 개설 및 효자다리 준공 개통

- 삼천 1 교,  이동교 교량 하부구조 공사 중

○ 우전로 개설공사 (기전여중고 ~ 서곡지구)추진

- 개    요 :  B =  35M,   L = 600M

- 추진내용 :  L = 300M 개설 일부구간 포장 완료

※ 기전여중고 임시 통학로 및 보안등 시설 완료

○ 문화재 시굴완료 및 발굴 조사 중

○ 지장물 및 편입토지 보상 추진      -------  95 %

- 대  상 :  2,730 건  954 억원 / 실적 2,484 건  904 억원

○ 체비지 매각            ------------------  75 %

- 계  획 :  680 필지  3,972 억원 / 실 적  321필지  2,997 억원

□ 문제점 및 대책

○ 문화재 발굴중으로 토사확보가 어려워 예정공정보다 부진

- 장기간 소요되는 공종(교량,구조물,매립폐기물등)과 토사확보가

가능한 지역부터 우선 추진하여 부진공정 만회

- 발굴조사가 완료되는 구역별로 문화재 지도위원회를 개최하여 사업추진

□ 이후 추진계획

○ 조경공사 (공원조성) 착공       ---------------    2005.07

○ 편입토지 및 지장물보상 완료  ---------------    2005.09

○ 문화재 발굴 조사 완료           ---------------     2006.03

○ 공사 준공                      ---------------    2007.02

○ 환지확정측량 및 처분절차 이행  ---------------    2007.03

○ 사업정산 완료                  ---------------    2007.12

35사단 이전

□ 사업개요

○ 위  치 : 덕진구 송천동, 전미동 일원

○ 면  적 : 44.6만평 ( 35사단 35만평, 항공대 9.6만평 )

□ 추진실적

○ 기부대양여 방식에 의한 이전협의 승인  : ’02. 8. 16

○ 5차례 실무추진위원 개최               : ’04. 2. 4까지

- 완주군 구이면 평촌리 90만평, 임실 사격장 50만평 확보 요구

- 해당 지자체 협의결과 반대의견에 따라 임실지역 이전 검토 요청

○ 현지실사(국회, 국방부, 육본, 군사령부) : ’05. 2. 2까지

○ 제6차 실무추진위원회 개최             : ’05. 5. 18

- 실무소위원회를 구성 단계별로 긴밀하게 협의 추진하기로 합의

※ 현재 합의각서 문안과 구체적인 시설규모에 대하여 실무 협의 중

□ 이후 추진계획

○ 합의각서(안) 체결(35사단장 ↔ 전주시장) : ’05. 3/4분기

○ 합의각서 국방부 승인 및 합의각서 체결    : ’05. 4/4분기

□ 이전부지 개발 기본방향

○ 개발규모는 35사단을 중심으로 북부권 신도시를 조성

- 35사단 부지를 포함하여 북부권 주변지역 60만평을 개발

○ 심포지엄(7월 중) 등 다각적 의견수렴을 통해 최적의 개발방향 결정

전주도시첨단산업단지 조성

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 팔복동 2가 728 일원(도공무원교육원 인근)

○ 사업규모 : 단지조성 32,845평(108,580㎡)

○ 사 업 비 : 266억원

- 기반조성비 88억원  - 용지보상비 167억원  - 기타 11억원

※ 시비 19,800백만원 확보(지방채 10,000백만원, 시도비 9,800백만원)

○ 사업기간 : 2004 ~ 2007(5개년)

□ 추진실적

○ 도시첨단산업단지 조성계획 수립  ---------   2003.02.24

○ 조사설계 용역 계약  --------------------  2004.02.25

○ 도시첨단산업단지 지정승인 ---------------  2004.09.08

○ 도시첨단산업단지 실시계획 승인 ----------  2004.12.24

○ 문화재 시굴조사 계약 -------------------  2004.03.02

○ 토지 보상협의 : 355건 16,750백만원 /285건 14,052백만원(84%)

□ 문제점

○ 기반조성 사업비 88억원중 68억원 미확보로 사업기간내 공사완료 곤란

○ 문화재 발굴조사(3개월 소요)로 인한 기반조성공사 착수 지연

□ 이후계획

○ 문화재 발굴조사는 2005.10.31한 조사완료

○ 기반조성 사업비 미확보 68억원은 2006년 본예산 전액 확보 사업 발주

차량등록사업소 소관

ꊱ	건설기계등록증 우편발송 서비스 ----------	73
ꊲ	휴지신고차량 검사 자동연기 서비스 --------	74
ꊳ	자동차 회수번호판 폐기방법 개선 ----------	75

건설기계 등록증 우편 발송 서비스

건설기계 신규 및 이전등록 신청시 민원인의 2회 방문

처리에 따른 불편 해소

ꏅ 서비스 개요

○ 건설기계 등록신청 민원인의 편의 제공(2회방문 → 1회)

○ 기존 업무처리 절차

	등록신청 접수	⇒	처 리	⇒	등록증 수령

(민원 1회 방문)                       (민원 2회 방문)

○ 개선 서비스 절차

	등록신청 접수	⇒	처 리	⇒	등록증 우편 발송

(민원 1회 방문)

ꏅ 추진실적

○ 건설기계 협회 도지회등 관련 단체 홍보

○ 안내문 게첨 홍보(게시판, 민원창구) : 2개소

※ 서비스 건수 :  38건 ( 6. 30 현재)

ꏅ 금후 추진계획

○ 민원 접수시 우편 수령방법의 지속적인 홍보 강화

⇒ 민원인의 시간적, 경제적 편의 제공

휴지신고차량 검사 자동연기 서비스

영업용 자동차 휴지신고만으로 자동차 검사 및 점검 유효기간을   자동으로 연장해 줌으로써 민원인 편의 제공

ꏅ 서비스 개요

○ 휴지신고기관 통보공문으로 자동 검사연기 처리(2회방문→1회)

	휴지 신청	⇒	공문 통보	⇒	검사 연기신청

(1회 방문)                        (※기존:2회방문 신청)

※ 휴지 신고 기관

- 렌트카, 버  스 : 도청 교통물류과

- 택시, 전세버스 : 시청 교통과

- 화물 자동차 : 전북화물자동차운송사업협회

ꏅ 추진실적

○ 분야별 담당자(6명) 직무 연찬

○ 관련기관 및 단체 협조 및 홍보 공문 발송

○ 안내문 게첨 홍보(게시판, 민원창구) : 2개소

※ 서비스 건수 :  60건 ( 6. 30 현재)

ꏅ 금후 계획

○ 영업용 자동차 등록신청시 지속적인 홍보 강화

자동차 회수번호판 폐기방법 개선

회수 번호판을 행정기관에서 직접 폐기함으로써 번호판

미회수 차량의 불법운행 방지와 회수 번호판 매각으로

세외수입 증대

□ 사업개요

○ 처리건수 : 연 50,000개정도(9,000㎏)

○ 사업기간 : 2005. 1월 ~ 12월

○ 페기번호판 매각 : 연 12,000천원 세외수입 예상

○ 관련법령

- 회수번호판 폐기 : 자동차관리법 제10조 제6항

□ 추진실적

○ 관내 고철업체 선정 및 매각계약 체결 ---- 2005.1월

○ 회수 번호판 매각

- 실적(2005.6월 현재) : 4,300천원 /3,400㎏

□ 이후계획

○ 회수 번호판의 철저한 폐기로 불법운행 방지 및

세외수입 증대