제224회 전주시의회 제1차 정례회

도 시 건 설 위 원 회

제228회 전주시의회 제2차 정례회

2005년도 행정사무감사특별위원회

2005년도

주요업무 추진상황 보고

도 시 관 리 국

보  고  순  서

□	일 반 현 황		-----------	2
□	2005년도 시 책 방 향		-----------	10
□	2005년도 주요업무추진상황보고		-----------	11
	○	도 시 과	-----------	12
	○	주 택 행 정 과	-----------	20
	○	도 로 과	-----------	28
	○	교 통 행 정 과	-----------	47
	○	교 통 기 획 팀	-----------	51
	○	재 난 안 전 관 리 과	-----------	56
	○	도 시 발 전 기 획 단	-----------	71
	○	차 량 등 록 사 업 소	-----------	75
	○	컨벤션복합시설건립추진팀	-----------	79

일  반  현  황

ꏅ 기구 ꠚꠚ  5과 1단 1사업소 2팀 37담당(현원 162명)

															도 시 관 리 국
	도 시 과														주 택 행 정 과																도 로 과
기업회계			도시계획				택 지 개발			토지관리				상가활성화			농촌지역개발			도심재정비			공동주택			일반건축				가로환경개선			도로재산관리				도로개설							도로유지관리						도로교통시설

	교통행정과																		교통기획팀																								재난안전관리과
주차장관리							운송사업지도							대중교통				교통기획			경전철				철도						교통정보관리							민방위				재 난 관리					복구지원			하천관리			하수도공기업			하수시설				하수처리

	도시발전기획단																								차량등록사업소																						컨벤션복합시설건립추진팀
용지보상				35 사 단 이 전							공단조성						신시가지조성							총괄지원				등록							무보험차량조사						건설기계동록										시설기획

□ 인 력

과 별		총 계	일 반 직						별정	기능
			4급	5급	6급	7급	8급	9급
계	정 원	162	1	8	37	49	37	4	1	25
	현 원	162		10	37	65	20	2	1	27
도 시 과	정 원	21	1	1	4	4	7	1	1	2
	현 원	20		2	4	7	4		1	2
주택행정과	정 원	18		1	5	8	4
	현 원	16		1	5	7	3
도 로 과	정 원	20		1	5	8	5			1
	현 원	20		1	5	11	2			1
교통행정과	정 원	16		1	3	6	3	1		2
	현 원	16		1	3	9		1		2
교통기획팀	정 원	18			4	4	2	1		7
	현 원	19		1	4	4	2	1		7
재난안전관리과	정 원	25		1	7	9	6	1		1
	현 원	26		1	7	12	4			2
도시발전 기 획 단	정 원	15		1	4	6	3			1
	현 원	16		1	4	8	2			1
차량등록 사 업 소	정 원	25		1	4	2	7			11
	현 원	26		1	4	6	3			12
컨벤션복합시설건립추진팀	정 원	4		1	1	2
	현 원	3		1	1	1

□ 분장사무

과 별	분 장 사 무
도 시 과	○ 기업회계. 국․과 주요시책 및 업무보고 ○ 도시계획결정․지적고시, 도시계획사업 시행인가 ○ 택지개발사업․구획정리사업, 6호광장 조성사업 ○ 전문건설업 및 건설기계사업자, 건설기계조종사 관리 ○ 새주소부여사업관리, 개별공시지가, 지적측량검사,
주택행정과	○ 국민주택관리․상환금 운영, 학교용지부담금 부과 ○ 주택건설사업계획승인, 사용검사, 주택정책 수립 ○ 건축인․허가, 건축심의, 건축조례 제․개정운영 ○ 주거환경개선, 구도심활성화사업, 농촌지역개발사업
도 로 과	○ 도로부지관리, 도로안내표지판 설치관리 ○ 도로포장 보수지도, 자전거도로 시설, 가로등관리 ○ 신규도로개설 및 용지보상, 도시가로망 확충사업 ○ 가로환경 및 노점상 지도단속, 자전거이용 활성화 ○ 도로교통 안전시설물 신설 및 유지관리
교통행정과	○ 교통종합계획 수립, 공영주차장 확충 및 관리 ○ 자동차운송사업체(버스. 택시 등) 지도감독 ○ 대중교통(버스, 택시, 화물) 업무 추진
교통기획팀	○ 시내버스정보화사업(BIS) 계획수립 및 구축 ○ 경전철 사업 추진 ○ 교통정보센타 운영 및 교통체계 개선사업 ○ 지능형 교통시스템 구축 및 운영 관리 ○ 전라선 단선․복선 전철화 사업
재난안전관리과	○ 민방위 계획수립 및 추진 ○ 재난방제 종합계획수립 및 시행.재난재해대책추진 ○ 자연하천조성사업, 하천관리 ○ 하수도공기업 운영, 국․공유재산 관리 ○ 하수관리 종합대책수립 및 시행 ○ 하수종말처리시설 운영관리
도시발전기획단	○ 서부 신시가지 조성사업 ○ 35사단 이전사업 ○ 연초제조창부지활용, 전주교도소이전, 첨단산업단지조성
차량등록사업소	○ 자동차 등록(전산입력, 자료관리 및 증명발급 등) ○ 자동차 및 건설기계 과태료부과, 무보험차량업무 ○ 건설기계등록(전산입력, 증명발급,검사최고, 정비명령 등) ○ 무보험차량(손해보상보장법위반 과태료, 범칙금부과등)
컨벤션복합시설 건 립 팀	○ 컨벤션복합시설 건립 업무 ○ 서신복합문화쎈터 건립

□ 기본현황

○ 도시계획 연혁

년 월 일	고 시 청	번 호	계획면적 (㎢)	목표 년도	계획인구	주 요 내 용
1938. 5. 9	조선총독부	403	19.76	1948	100,000	도시계획구역 결정(1차)
1966. 2.10	건설교통부	2,188	108.71	1983	550,000	도시계획 재정비(2차)
1970. 4.14	″	178	157.22	1986	500,000	도시계획 재정비(3차)
1973. 6.27	″	258	313.20			개발제한구역 216.4㎢ 지정
1974. 8.14	″	272	313.20			도시계획 재정비(4차)
1976. 3.27	″	37	313.20			도시계획 재정비(5차)
1986. 5. 8	″	206	313.20	1991	610,000	도시계획 재정비(6차)
1995. 6.29	전라북도	112	313.20	2001	860,000	도시계획 재정비(7차)
2003. 6.26	건설교통부	161	302.67			개발제한구역 225.4㎢해제
2005. 7.29	전라북도	186	313.18	2010	748,000	도시계획 재정비(8차)

○ 용도지역 --------------- 4개지역 304.53㎢(비도시지역8.65㎢제외)

구분	주 거 지 역			상업 지역	공 업 지 역				녹 지 지 역
	계	일 반 주 거	준주거		계	전용공업	일반 공업	준공업	계	생산 녹지	자연 녹지	보전 녹지
면적	31.933	31.576	0.357	4.114	6.202	1.444	3.865	0.893	262.281	40.722	109.217	112.342
비율 (%)	10.6	10.5	0.1	1.3	2.0	0.5	1.2	0.3	86.1	13.3	35.9	36.9

○ 용도지구  --------------- 7개지구 21,458,664천㎡ (6,491천평)

지 구 명	개 소 수	면 적(㎡)	비 고
고 도	16	7,955,679
방 화	21	4,075,560
미 관	74	3,656,467
자연취락	250	5,114,305
경 관	7	406,574
시설보호	1	249,900
보 존	2	6,179

○ 주  택

구 분	계	단독주택	다세대 주택 동당660㎡미만	연립주택 (4층이하)	아파트 (5층이상)	주택보급율 (2004년도)
주택수	180,515	58,096	4,535	3,414	114,470	88.95%
비율(%)	100	32.18	2.52	1.89	63.41

○ 지  적

(단위 : ㎢)

구분	합 계		대 지			임 야			기 타
	필지수	면적	필지수	면적	%	필지수	면적	%	필지수	면적	%
계	193,885	206.1	72,920	24.4	11.8	11,134	72.1	35.0	109,831	109.6	53.2

○ 도  로

(단위 : 개소, ㎞)

구 분	계		고속국도		일반국도		지 방 도		시 도
	노선	연 장	노선	연 장	노선	연 장	노선	연 장	노선	연 장
총연장	850	407	1	5	5	62	3	22	841	318
포장도	850	407	1	5	5	62	3	22	841	318
포장율 (%)		100		100		100		100		100

※ 도로율 : 16.28%(도로면적/시가지면적)

○ 교량 및 기타시설물

(단위 : 개)

구분 계	교 량					육교 보도	지하 보도	지하차도	터널	비 고
	소계	고속 국도	시의 국도	지방도	시도
122	103		34	3	66	6	6	5	2

※ 장대교량(삼례교 : 570m,  회포대교 : 707m)

○ 건설기계조종사면허 현황

(단위 : 건)

계	불도우저	굴삭기	로우더	지게차	기중기	로울러	기 타
6,384	364	2,095	543	1,564	307	123	1,388

○ 옥외광고물 현황

(단위 : 개)

광고업자 등록현황	시 지 정 광 고 시 설				비 고
	계	게시대	벽보판	기 타
430	515	150	365	-

○ 운수업체

(단위 : 개소/대)

구 분	계	버 스			택 시		화 물		렌트카	특수차	특수여객
		시내	시외	관광	회 사	개 인	회 사	개 인
업 체 수	211	5	5	19	25		70		23	51	13
보유대수	9,787	406	425	329	1,599	2,220	1,723	2,023	862	175	25

○ 자동차등록

(단위 : 대)

합 계	승 용 차	승 합 차	화 물 차	특 수 차
199,682	148,440	12,784	38,149	309

○ 하  천

(단위 : ㎞)

구 분		개소	하천연장	제 방 연 장			개수율 (%)	비고
				계	기개수	미개수
계		32	132.8	202.2	182.4	19.8	90.2
법정하천	소 계	29	127.0	189.4	176.0	13.4	93.0
	국가하천	3	24.7	25.6	25.6	-	100.0
	지방 1급	2	18.2	37.5	36.0	1.5	96.0
	지방 2급	24	84.1	126.3	114.4	11.9	90.6
소 하 천		3	5.8	12.8	6.4	6.4	50.0

○ 하 수 도

구 분		처리구역 (㎢)	계획연장 (㎞)	시설연장 (㎞)	미시설연장 (㎞)	보급율 (%)	비고
계		53.1	2,317	1,321	996	57.0
합 류 식		18.9	653	653	0	100.0
분류식	소 계	34.2	1,664	668	996	40.1
	오수관거	-	920	435	485	47.2
	우수관거	-	744	233	511	31.3

○ 하수․위생처리 시설

구 분	하 수 처 리	위 생 처 리
위 치	덕진구 송천동 2가 1130번지
시설용량	1일 처리능력 ⇨ 403,000㎥ - 1단계 시설 : 103,000㎥ - 2단계 시설 : 200,000㎥ - 3단계 시설 : 100,000㎥	1일 처리능력 ⇨ 290㎘ - 분 뇨 : 30㎘ - 정 화 조 : 260㎘
처리방법	1․2단계 표준 활성 슬러지법 3단계 고도처리 공법	하수 연계처리 (1994년부터 시행)

○ 차집관로

하 천 명	연 장 (㎞)	맨 홀 (개)	우수토실 (개소)	환기구 (개소)	여수토실 (개소)
계 (5개노선)	71.8	1,110	227	8	79
전주천 (좌, 우안)	33.3	516	143	7	47
삼 천 (좌, 우안)	13.4	155	41		17
금암천 (좌, 우안)	2.9	82	20		9
아 중 선	11.4	174	13		4
팔복선(공장,생활)	10.8	183	10	1	2

2005년도 시책방향

	도시공간 구조개선으로 광역도시 기반구축
◦ 100만 인구의 수용이 가능한 도시기반시설 확충 ◦ 생태적이고 쾌적한 환경조성으로 경쟁력있는 도시건설 ◦ 재난 재해의 사전예방으로 살기 좋은 전주건설

⇩

	중점추진방향
			ㅡ
		ㅣ
◦ 도시기반시설 확충을 위한 도시관리계획 마무리 ◦ 계획적인 택지개발로 안정된 주택공급 및 도시기반시설 구축 ◦ 미래 지향적인 교통체계 구축과 양질의 대중교통서비스 제공 ◦ 구도심과 신시가지 균형발전으로 시민의 삶의 질 향상 ◦ 생태하천 조성으로 자연환경 보존 및 수질 개선

2005년도

주요업무추진상황보고

도 시 과  소 관

ꊱ	도시관리계획 재정비 추진 ----------------	13
ꊲ	도시계획시설 매수청구제 시행 ------------	15
ꊳ	송천지구 토지구획정리사업 ---------------	16
ꊴ	우석대 한방병원 인근소로(1-30호선)개설공사 -	17
ꊵ	6호광장 조성사업 ------------------------	18
ꊶ	새주소 부여사업 활용 --------------------	19

도시관리계획 재정비 추진

□ 도지사 권한사항

○ 주민의견청취 ----------------------- 2004.11.24～12.07

○ 전주시의회 의견청취 ---------------- 2004. 12. 20

○ 전주도시관리계획변경(안) 도 신청 --- 2005. 01. 06

○ 지방도시계획위원회 심의 및 결정 ----- 2005. 05. 12

○ 도시관리계획 지적고시등 재정비 완료--  2005. 07

□ 시장 권한사항

구 분		폭원(m)	노 선 수
			계	집 행	미집행	미집행비율(%)	비고
계			2,753	2,049	704	25.6
중 로		12～25	240	171	69	28.8
소 로		6～12	2,513	1,878	635	25.3
	1 류	10	323	249	74	22.9
	2 류	8	925	661	264	28.5
	3 류	6	1,265	968	297	23.5

※ 2005년 예산 : 354백만원

□ 기본방침

○ 기존시가지 : 정비기준을 수립 과감하게 폐지 및 변경결정

○ 미개발지역 : 가능한 존치하고 시설기준에 불합리한 노선에

대하여는 일부 조정(개별 건축시 확보가능)

○ 전문가, 시민 등의 다양한 의견을 최대한 수렴하여 반영

○ 공정하고 투명하게 추진함으로서 행정신뢰도 제고

⃞ 추진실적

○ 장기미집행 도시계획시설(도로) 폐지(1차) --- 1999.11.15

- 소로 103개 노선

○ 장기미집행 도시계획시설(도로) 폐지(2차) --- 2002. 3.13

- 소로 34개 노선

○ 장기미집행 도시계획시설 전수조사 ----------- 2003. 9～

- 대  상 : 3,404개소

- 집  행 : 2,675개소

- 미집행 : 729개소(광로1, 대로30개소 포함)

(도로735, 광장16, 학교6, 공원13, 녹지2, 유원지1, 기타1)

□ 이후계획

○ 주민공람 및 의견청취 ------------------------ 2005.11

○ 시 도시계획위원회 심의 ---------------------- 2005.12

○ 도시계획 변경 결정 및 지적고시 -------------- 2005.12

도시계획시설 매수청구제 시행

○ 대 상 : 2001.12.31기준 도시계획시설 결정후 10년 이상된 시설중

지목이 “대지”인 토지는 2002.1월부터 매수청구 가능

- 필지수 6,931필지  - 면적 493천㎡ (보상비: 3,823억원정도)

○ 절 차 : 청구일부터 2년이내 매수여부 결정, 결정 후 2년이내 매수

□ 매수청구 현황

○ 매수청구기간(2002.1～2005. 11월말 현재)

- 신 청 건 수 : 141건  (도로 126, 공원 12, 기타  3)

- 청 구 면 적 :  26천㎡(도로  17, 공원  7, 기타  2)

- 매수 추정액 : 210억원(도로 152, 공원  9, 기타 49)

○ 연도별 신청건수 : 2002년(85건) 2003년(28건) - 2005년 통보

2004년(12건) 2005년 (16건) - 2006년 통보

※ 2005년 추경예산 : 10억원 (장기미집행대지보상특별회계)확보

□ 추진실적

○ 매수결정 통보 113건 193억원

- 2002년도 접수분(매수 67건 106억원, 불가및해제 18건 13억원)

- 2003년도 접수분(매수 20건  61억원, 불가   8건 13억원)

․도시계획시설내 건축허용대상 : 매수 불가 통보한 토지 및

매수 통보한 날로부터 2년 이내에 매수하지 못한 토지

- 건축허용범위 : 철근콘크리트 및 철골철근콘크리트가 아닌

건축물로 단독주택(3층이하), 제1종근린생활(3층이하), 공작물

□ 이후계획

○ 2005년 제1회 추경에 확보된 10억원으로 연내 보상 시행

○ 토지소유자로부터 매수청구 접수후 현지 여건 분석

○ 도시계획시설 매수청구시 관련부서 협의 및 전문가 의견수렴

○ 시설별 소관부서 매수여부 참조하여 분기별 최종 결정 통보

송천지구 토지구획정리사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 송천동 1, 2가 일원(농수산물 도매시장 남단)

○ 사업개요 : 택지조성 262,392㎡(79,373평)

○ 사업기간 : 2001. 7 ～ 2005. 12

○ 총사업비 : 27,342백만원(공사비 13,091 보상비및기타 14,251)

□ 추진실적(공정율 99%)

○ 사업시행 인가 ---------------------------------- ’01. 7

○ 사업착공 ---------------------------------------- ’01.11

○ 도시계획변경 및 지구단위계획 결정고시 --------- ’04. 3

○ 환지예정지 지정 및 공고 ------------------------ ’04. 8

○ 환지처분에 따른 토지평가 위원회 개최  ---------  ’04.12

○ 환지 확정측량 완료(대한지적공사) --------------  ’05. 3

○ 사업시행 변경인가-------------------------------  ’05.10

○ 시설공사 완료 및 공고 -------------------------  ’05.11.13

□ 이후계획

○ 환지확정처분 및 등기 -------------------------- ’05. 11

○ 사업완료 -------------------------------------- ’05. 12

우석대 한방병원 인근 소로(1-30호선)개설공사

어은로 및 MBC방송국 진입로, 예수병원 뒷길 교차지점의 극심한

교통정체의 해결을 위한 교통체계 개선 필요

□ 현    황

○ 위    치 : 완산구 중화산동 우석대 한방병원 인근

○ 사업개요 : 도로개설 L=302m, B=10m

○ 사업기간 : 2005. 9 ～ 2006. 12

○ 사 업 비 : 17억원(보상 8억원, 공사비 9억원)

□ 추진상황

○ 실시계획인가 ------------------------------------ 2005. 9.13

○ 토지보상 협의 완료 ---------------------------- 2005.11.30

※ 보상실적 : 15필지 2,928㎡ 중 11필지 2,882㎡ 협의

□ 이후계획

○ 공사착공 -------------------------------------- 2005. 12.

○ 사업준공 -------------------------------------- 2006. 6.30

6호광장 조성사업

□ 현    황

○ 위      치 : 완산구 고사동 9-7번지 외 2필지(오거리)

○ 면      적 : 723.9㎡(총보상액 2,622백만원)

- 고사동 9-7번지 : 697.5㎡(보상액 2,567백만원)

○ 가설건축물 : 연면적 948.09㎡(3층) - 유창영 소유

○ 입주세입자 : 향리 외 14개 업소

□ 토지보상 협의 추진상황

○ 협약체결(건축물 철거 및 보상) ------------------ 2005.10.31

- 토지주 자진철거 및 세입자 이주에 관한 사항 협약

○ 토지 소유권 이전 등기 -------------------------- 2005.10.31

○ 세입자 협의 추진 : 15업소 중 13업소 완료

□ 금후계획

○ 민자유치(빛과 소리의거리 조성사업) 협약  -------- 2005. 11.

○ 세입자 이사 및 가설건축물 철거 ------------------ 2005. 11.

○ 주민 설명회 개최 및 의견수렴  ------------------------ 2005. 12.

○ 사업시행 ------------------------  2005. 12. ～ 2006. 3

새주소 부여사업 활용

전주시 전체 2,700여개의 도로명이 있어 시민들이 숙지할 수

있도록 하고 또한 새주소가 편리한 생활주소로 활용될 수

있도록 하기 위함

□ 사 업 개 요

○ 위    치 : 전주시 전역

○ 사업규모 : 도로명판 120 개,  건물번호판 3,200개

○ 총사업비 : 80백만원

○ 사업기간 : 2006. 4 ～ 2006. 10(7개월간)

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

재원별	총사업비	기 투 자				2006 계 획	2007 이 후
		계	’03년	’04년	’05년
계	289	209	92	77	40	80
국 비
균특회계	37	37	20	17
시 비	252	172	72	60	40	80

□ 2005년까지 추진실적

○ 도로명판 5,670개, 건물번호판 65,000개 부착설치

○ 1,500여개의 배달업소에 새주소안내지도 배부 및 각종

매스컴, 홈페이지를 통한 퀴즈이벤트로 홍보 강화

□ 이후계획

○ 소로개설 및 주거환경개선사업등으로 개설되는 지역에 도로명판 설치

○ 신축건물 및 오류, 훼손된 건물번호등에 대하여 건물번호판 부착

○ 각종 도시개발사업 및 택지개발사업지구내 도로명판 및

건물번호판 설치

주택행정과 소관

ꊱ	구도심 활성화사업 추진 --------------------------	21
ꊲ	농촌지역 환경개선(숙원)사업 ---------------------	22
ꊳ	농촌 주거환경개선(마을정비)사업 -----------------	23
ꊴ	노후공동주택 관리비용 지원 ----------------------	24
ꊵ	임대주택 주거환경개선 사업추진 ------------------	25
ꊶ	도시주거환경 개선사업 --------------------------	26
ꊷ	도시및주거환경정비기본계획수립 ------------------	27

구도심 활성화사업 추진

□ 사업개요

○ 대    상 : 구도심권 7개동 12㎢

- 특화․특정거리 조성 : 7개소(걷고싶은․영화․차이나․웨딩․약전․동문․공구)

- 주차장 확충 : 4개소(오거리, 중앙시장, 남부시장, 웨딩거리)

- 보조금 지원 : 4대문안 내 건축․수선

○ 사업기간 : 2002.08 ～ 2011.12(10개년)

○ 사 업 비 : 68,049백만원(지금까지 실적 12,302백만원)

2005년예산 : 650백만원 (시설비 250,  보조금 400)

□ 추진실적

○ 특화ㆍ특정거리 조성공사 완료(걷고싶은․차이나․영화거리)

○ 오거리 주차장시설 완료(202면)

○ 구도심활성화지원조례에 의한 보조금 지원(4억)

○ 웨딩거리 실시설계 용역 착수(2005. 3월)

□ 문제점 및 대책

○ 웨딩거리 조성사업비 24억원 미확보로 사업추진에 어려움 → 2006년 예산확보

○ 약전거리 조성사업은 조성구간에 대하여 약령시제전위원회와 이견

→ 조성구간 재협의 후 추진

□ 이후계획

○ 특화거리 조성  ---------------------------- 2005.3～2006.12

- 웨딩거리 실시설계 용역완료 --------------- 2006.1

- 웨딩거리조성(지중화)사업 : 1개노선 450m- 2006.3~12

○ 관광조명시설(루미나리에)설치 -------------- 2006.3

○ 구도심활성화를 위한 보조금 계속지원

농촌지역 환경개선(숙원)사업

도심과 상대적으로 소외받고 있는 농촌지역의 열악한 주거환경을 개선함으로써 살기좋은 농촌을 건설하고, 도․농간의 지역균형발전 도모

□ 농촌지역 현황

○ 마 을 수 : 206개마을

○ 면    적 : 430㏊    (완산 167, 덕진 263)

○ 인 구 수 : 39,587명 (14,546세대)

□ 사업개요

○ 총 사업비 : 37,692백만원   (624건)

○ 기     간 : 2005 ～2009년 (5개년)

○ 사업대상 : 도로, 상․하수도, 주민편익시설 등 기반시설

2005 사업개요

- 사 업 비 : 30억원 (완산 13, 덕진 17)

- 대상지역 : 농촌지역 자연마을

- 사업선정 : 농촌지역 개발계획 용역결과에 의한 우선 순위별

사업의 시급성 및 타당성 등 검토 선정

- 주요사업 : 도로포장, 상하수도, 주민편익시설 등

□ 추진실적

○ 농촌지역 개발계획 용역완료  ----------  ’05. 2. 28

○ 2005 사업대상지 조사  ---------------  ’05. 3 ~ 4월

○ 공사착공 (구청)  ---------------------  ’05. 10월

□ 이후계획

○ 사업완료 (구청)   ---------------------  ’05. 12. 31

농촌주거환경개선(마을정비)사업

□ 사업개요

○ 대상지구 : 11개지구(농촌주거환경개선 사업지구 지정마을중                  행자부 사업승인)

․2004년 이월사업 : 2개지구 - 한절리, 삼천

․2004년 계속사업 : 2개지구 - 원석구, 오매

․2005년 신규사업 : 7개지구

- 하수처리 미설치 지구 (3개지구) : 원색장, 용산, 영동재방

- 하수처리 설 치 지 구 (4개지구) : 황소, 문정, 삼거, 만성옥계

2005년예산 : 6,670백만원 (국비 3,000 시비 3,000 명시 670)

□ 추진실적

○ 2004년 이월사업 2개지구 공사완료

○ 2004년 계속사업 2개지구 공사중

․기  간 : ’05. 5. 30 ～ 12. 31

○ 하수처리 미설치 3개지구 공사중

․기  간 : ’05. 5. 30 ～ 12. 31

○ 하수처리 설치 3개지구 사업발주 - ’05. 10. 31

□ 이후계획

○ 2004년 계속사업 2개지구 사업완료  - ’05. 12. 31

○ 2005년 신규사업 7개지구

․하수처리시설 미설치 3개지구

- 사업시행 : ’05. 10 ~ ’06. 2. 28

․하수처리시설 설치 3개지구

- 사업시행 : ’05. 11 ~ ’06. 3. 31

※ 혁신도시 결정으로 만성옥계지구 사업계획 변경 추진

노후공동주택 관리비용 지원

□ 공동주택관리 현황

(2005.11월현재)

구 분	단지수	세대수	전용면적별(㎡)			국민주택규모
			60미만	60~85	85초과
계	439	121,489	62,506	41,185	17,805	103,691 (전체 85.4%)
아파트	367	118,504	60,897	39,933	17,674
연 립	72	2,985	1,609	1,252	132

○ 노후공동주택 단지 현황

- 91개단지 11,525세대

∙ 완산구 : 39개단지/6,176세대

∙ 덕진구 : 52개단지/5,349세대

2005년 예산확보 : 200백만원

□ 추진실적

○ 2003.상반기 : 노후공동주택 실태조사

○ 2004.상반기 : 주택법개정에 따른 조례(안) 마련

○ 2005.6.24 : 전주시 주택조례 제정

- 지원금액 : 사업비의 70%이하로서 1,000만원이하

○ 2005. 10 : 관리비용지원대상 확정- 22단지(완산10,덕진12)

□ 이후계획

○ 2005. 10~12 : 관리비용지원 시행 및 정산

○ 2006. 12월 : 2006년 예산확보 요구(300백만원)

임대주택 주거환경개선 사업추진

□ 추진배경 및 개요

○ 2004년 건교부의 임대주택 주거환경개선사업 결정에 따라

10년이상 경과된 공공임대주택단지(영구임대)에 대한 노후

기반시설의 정비추진 - 우리시 평화주공1단지 해당

○ 2004년 사업확정 및 추경예산 확보에 따라 명시이월 2005년 추진

- Matching-fund 지원방식에 따라 시비(50%)확보시 국비(50%)지원

2005년 예산 : 442백만원(국 221, 시 221)

□ 추진실적

○ 영구임대주택 주거환경개선사업 수요파악 ----- 2004. 3.19

- 대상단지 : 평화동 주공1단지

○ 사업결정(건교부)에 따른 국고보조 지급신청 -- 2004. 7. 6

○ 임대주택주거환경개선사업 및 사업비 확정통보 - 2004. 9. 3

○ 임대주택 주거환경개선사업 협약체결(전주시-주공) - 2005. 3.25

○ 사업비(보조금) 집행 ------------------------ 2005. 8.24

○ 평화주공 1단지내 5개사업 착공 ------------- 2005. 9

□ 이후계획

○ 사업완료 및 정산 --------------------------- 2005.12

도시주거환경 개선사업

도시저소득 주민을 위한 주거환경개선의 지속추진으로 삶의 질을

향상시키고 모든 시민이 함께 잘사는 으뜸 복지도시건설

□ 사업개요

○ 위    치 : 진북동 도토리골지구 등 18개지구

○ 사업규모 : 863,571㎡(261,231평) 16,881명(5,1546가구)/3,822동

○ 총사업비 : 88,645백만원(국비36,596 도비8,123 시비43,926)

○ 사업기간 : 2001 ~ 2005년

□ 추진실적

○ 17개지구 지정고시 ------------------------ 1999.11.24

○ 낙수정지구 지정고시  ---------------------- 2002.12.26

○ 완  공 : 16개지구(도토리골, 어은2․3, 밤나무골, 난민촌2, 앞검암 등)

○ 미완공 :  2개지구(낙수정, 인후농원)

○ 현 전체공정의 97% 완료

- 도  로 82개노선     - 주차장 21개소     - 소 공 원  8개소

- 놀이터 15개소       - 경노당  8개소     - 이주 유도  3개소

2005 예산 : 1,220백만원(국비 460 시비 760)

□ 이후계획

○ 낙수정지구 공공기반시설, 주민복리시설 마무리--   2005.12

○ 인후농원(주택공사시행)

- 감정평가 보상실시, 주택철거 및 사업완료 ---  2007. 6

○ 2단계 공전지구외 20개 지구 지정 용역 시행중 ---- 2006.4월까지

도시 및 주거환경정비 기본계획수립

□ 현  황

○ 기본계획수립개요

- 기본계획수립구역 :10㎢ (기초조사 : 주거지역30㎢)

- 용역기간 : 2004.10 ~ 2006. 6

- 도급자 : 주)도화, 전일엔지니어링

□ 그간 추진상황

○ 기초자료수집 및 Data-Basc구축 -------------------- ’04.12

○ 대상지역 현장조사 및 분석  ------------------------- ’05.1~3

○ 기본계획수립 및 구역지정(안) 주민홍보 -------------- ’05.3

※23개동 59개지구 순회 방문 설명회개최

○ 대상지역 현황 및 분석(지역주민의 추가편입 및 제척요구포함) ----  ’05. 4~ 7

○ 정비 예정구역 대상범위 대략 선정 ------------------- ’05.9

○ 현안에 따른 조치사항등을 반영한

기준(안)재설정 및 예정구역조정 --------------------- ’05.10

□ 이후계획

○ 시 도시계획위원회 및 건축위원회(전문가) 자문 ------- ’05.11

○ 시 도시건설위원회 간담회 --------------------------- ’05.11

○ 용역중간보고회 개최 -------------------------------- ’05.12

○ 주민공람 및 시의회의견청취 -------------------- ’05.12~’06.2

○ 전북도 도시계획위원회 심의 ------------------------- ’06. 2

○ 전북도 승인 고시 ----------------------------------- ’06. 4

도 로 과 소 관

ꊱ	장승백이길(남부순환도로)개설 -------------	29
ꊲ	남천로(전주천 좌안도로) 확장 -------------	30
ꊳ	녹두길(전주진입로) 확장 ------------------	31
ꊴ	한방병원～대학로간 확장 ------------------	32
ꊵ	동산고가교 접속도로 확장 -----------------	33
ꊶ	견훤로 개설 ------------------------------	34
ꊷ	태평로 확장 ------------------------------	35
ꊸ	남도주유소～고속터미널간 도로확장 --------	36
ꊹ	한옥마을 테마관광로(은행로) 확장 ---------	37
	원대한방병원～가련교간 도로개설 ----------	38
	대학로개설관련 전북대시설 지원사업 -------	39
	교통사고예방을위한 구조개선및안전시설물정비 ---	40
	어린이보호구역 개선사업 ------------------	41
	자전거도로 확충 --------------------------	42
	중앙분리대(화단) 설치 --------------------	43
	자전거타기 활성화 ------------------------	44
	서남권 국도대체우회도로개설 --------------	45
	북부권 국도대체우회도로개설 --------------	46

장승백이길(남부순환도로) 개설

□ 사업개요

○ 구    간 : 동서학동 좁은목 ~ 금구선(시의국도 27호선)

○ 사 업 량 : 연장 7,250m,   폭 25~ 35m

○ 사 업 비 : 114,579백만원

○ 사업기간 : 1988 ～ 2007(20개년)

※ 1단계 : 좁은목 ～함대부락 5,680m ⇒ 98,079백만원

2단계 : 함대부락～금구선  1,570m ⇒ 16,500백만원

□ 추진실적(1단계 공정 65%)

○ 용지매입 및 공사추진(장승로～거산황궁ⓐ～무궁화주유소 )

: 973m / 12,257백만원 ---------------------- ’98 ~ ’05.12

○ 흑석골～거산황궁ⓐ～무궁화주유소간 임시개통(853m) ----- ’05. 8

○ 교대뒤 위험건물 우선보상 완료(24동) ------------- ’05.10

○ 장승로～흑석골 구간 공사추진(120m) -------------  ’05.11

※ 2005년도 확보예산 4,300백만원

□ 이후계획

○ 장승로～거산황궁@～무궁화주유소(973m) 준공  ------ ’05.12

○ 거산황궁@～좁은목(960m) 구간 보상 및 공사추진---- ‘06～’07

※ 2단계 사업은 효자6지구 사업과 병행 토지개발공사에서

시행 예정 (2005~2011)

남천로(전주천 좌안도로) 확장

□ 사업개요

○ 구    간 : 한벽교 ～ 서신교(시의국도 1,27호선)

○ 사 업 량 : 연장 4,150m,   폭 8~12 ⇒ 25m

○ 사 업 비 : 45,336백만원

○ 사업기간 : 1998 ~ 2009(12개년)

※ 1단계 : 한벽교 ~ 완산교 (2,010m,폭25m) 30,149백만원

2단계 : 완산교 ~ 서신교 (2,140m,폭12m) 15,187백만원

□ 추진실적(1단계 사업완료 : 100%)

○ 년도별 공사준공

- 한 벽 교～싸전다리 L=1,050m  -------------- ’02. 5

- 초록바위～매 곡 교 L=  760m  -------------- ’03.12

- 초록바위구간확장(절개지 보강완료)L=  200m--- ’05. 5

※ 2005년도 확보예산 910백만원

○ 2단계사업 실시설계용역 추진

- 도로폭 결정 의견수렴 및 환경성 검토 중 ------  ’05. 11

□ 이후계획

○ 2단계사업 실시설계용역 마무리 ------------------  ’06. 2

○ 2단계사업시행   ---------------------------  ’06.~ ‘09

- 완산교~서신교  L=2,140m(B=8 ⇒ 12~25m)

녹두길(전주진입로) 확장

□ 사업개요

○ 구    간 : 원대한방병원～팔복동 BYC(시의국도)

○ 사 업 량 : 연장 1,360m,   폭 35 ⇒ 50m

○ 사 업 비 : 17,000백만원

○ 사업기간 : 1999 ~ 2006(7개년)

□ 추진실적(전체공정 56%)

○ 원대한방병원~추천대교간 확장개통(L=710m) ---- ’03.12

○ 추천대교~동화약품(편측205m) 확장완료 --- '04.12～’05.9

○ 동화약품～BYC구간 일부 보상완료 ---------------- ’05.10

※ 2005년도 확보예산 1,000백만원

□ 이후계획

○ 추천대교～BYC(양측650m)보상 및 공사추진 --- ’06.1～12

한방병원～대학로간 확장

□ 사업개요

○ 구    간 : 금암동 사대부고~녹두길(시의시도)

○ 사 업 량 : 연장 2,630m,   폭 25~35m

○ 사 업 비 : 27,000백만원

○ 사업기간 : 1995 ~ 2006(12개년)

□ 추진실적(전체공정 86%)

○ 사대부고～연화마을(1,200m) 구간 완료 -------- ’95~’01

○ 송천삼거리～도립국악원(250m) 구간 개통 ------ ’02~’03

○ 연화마을～송천삼거리(880m) 구간 개통 ------ ’04~’05.5

※ 2005년도 확보예산 : 300 백만원

□ 이후계획

○ 잔여구간(도립국악원~원대한방병원 330m) 보상 및 공사 추진

------------------------------------------- ‘06. 1 ~ 12

동산고가교 접속도로 확장

□ 사업개요

○ 구    간 : 동산동 동산고가교 ~ 동산역(시의시도)

○ 사 업 량 : 연장 340m,   폭 18.5 ⇒ 35m

○ 사 업 비 : 2,990백만원

○ 사업기간 : 2003 ~ 2006(4개년)

□ 추진실적(전체공정 28%)

○ 용지매입 및 실시설계 완료 --------------------  ’04. 12

○ 동산가교～동산역 상행선 확장공사 완료 -----  ’04.12 ~‘05.5

○ 영농철 농업용수 공급으로 공사일시중지 -- ‘05.5.2～10.19

※ 2004년도 이월액 600백만원

□ 이후계획

○ 농업용수로 복개(60m) --------------------------- ’05.10～12

○ 동산고가교~동산역 하행선 확장 및 중앙분리대 시설 --- ’06

견 훤 로  개 설

□ 사업개요

○ 구    간 : 중노송동 마당재 ~ 기린로

○ 사 업 량 : 연장 1,650m,   폭 30m

○ 사 업 비 : 27,000백만원

○ 사업기간 : 1999 ~ 2007(9개년)

※ 확보된 예산이 없어 2002. 5. 27일 공사중지

□ 추진실적(전체공정 51%)

○ 마당재 ～ 기린봉@(L=560m/11,900백만원)개통-- ’01.12

○ 도시계획도로 선형변경추진(부결) ------------------ ’05. 5

○ 보상추진(잔여지 8필지) ----------------- ’05.3 ~ ’05.11

※ 2005년도 확보예산 : 500 백만원

□ 이후계획

○ 도시계획도로 선형변경 전문가 자문 ---------- ’05. 12 ~

태 평 로  확 장

□ 사업개요

○ 구    간 : 구 MBC사거리 ~ 대동길(시의시도)

○ 사 업 량 : 연장  900m,  폭 13 ⇒ 25m

○ 사 업 비 : 11,000백만원

○ 사업기간 : 2004 ~ 2008(5개년)

□ 추진실적(전체공정 5%)

○ 실시설계용역 추진 ----------------------------- ’04. 6

- 유관기관(한전,통신,가스등 지하매설물 협의 완료)

○ 지장물조사 및 보상(743백만원) ------------- ’04.1～12

○ 지장물 보상(대동길～하나로마트)   ---------- ’05.1～ 6

※ 2005년도 확보예산 : 500백만원

□ 이후계획

○ 실시설계 용역 마무리------------------------------  ’06. 2

○ 보상 및 공사추진(구MBC사거리 ~ 대동길)------ ’06~’08

남도주유소～고속터미널간 도로확장

□ 사업개요

○ 구    간 : 금암동 남도주유소 ~ 고속터미널간(시의시도)

○ 사 업 량 : 연장  500m,   폭 20 ⇒ 23m

○ 사 업 비 : 3,500백만원

○ 사업기간 : 2004 ~ 2008(5개년)

□ 추진실적(전체공정 5%)

○ 도시계획 도로 폭 축소(25m⇒23m)결정 ---------  ’05. 6

- 대로 미관지구를 위한 최소폭 확보

○ 지적고시 결정   -------------------------------   ’05. 8

○ 실시설계용역   --------------------------   ’05.9～‘06.2

○ 편입토지 감정평가 의뢰 ------------------------   ’05.11

※ 2004년도 이월예산 200백만원(도비)

□ 이후계획

○ 편입토지 및 지장물 보상 추진 -----------------  ’05. 12 ~‘06. 6

○ 사업시행 인가 및 공사추진 --------------------- ’06. 3～12

한옥마을 테마관광로(은행로) 확장

□ 사업개요

○ 구    간 : 남천교~동부시장(시의시도)

○ 사 업 량 : 연장 980m,  폭 8 ⇒ 12m

○ 사 업 비 : 6,500백만원

○ 사업기간 : 2005 ~ 2006(2개년)

□ 추진실적(전체공정 10%)

○ 실시설계 용역착수(용역중지) ------------------ ’04.10~

○ 도로폭원 결정 관련 협의(3차례) ----------  ’04.12~’05. 4

- 한옥보존위원회 자문, 주민설명회 등

○ 도시계획변경결정(폭15⇒12m)추진----------------  ’05. 8

○ 분할측량 및 보상추진(L=400m) -------------  ’05.9～12

※ 2005년도 확보예산 : 2,000 백만원

□ 이후계획

○ 사업 실시계획인가 ----------------------------- ’05. 12

○ 실시설계 완료 --------------------------------- ’06.  2

○ 용지보상 및 공사추진 -----------------------  ’06.1～12

원대한방병원～가련교간 도로개설

□ 사업개요

○ 구    간 : 원대한방병원 ~ 가련교간(시의시도)

○ 사 업 량 : L= 1,250m,   B= 35m

○ 사 업 비 : 27,000백만원

○ 사업기간 : 2003 ~ 2008(6개년)

□ 추진실적(전체공정 4%)

○ 기본 및 실시설계 마무리(260백만원) ------------- ’03.11

○ 도시계획변경 결정(광장축소)---------------------- ’05. 6

○ 편입토지 보상중(한방병원앞 부근) ------------ ’05. 8～12

※ 2005년도 확보예산 : 800백만원

□ 이후계획

○ 도시계획변경 지적고시(광장)  --------------------- ’05. 8

○ 편입 토지보상 추진 --------------------------- ’06. 1~12

○ 원대 한방병원～가련교간 공사추진 ---------------  ’06~’07

※ 하가지구 택지개발 시행(토지개발공사) --------  ’05～’08

대학로개설관련 전북대시설 지원사업

□ 사업개요

○ 구    간 : 전북대학교내

○ 사 업 량 : 대운동장보수 1식, 학군단증축 106평,

동물병원후면 배수BOX L=22m(3×3×2련)

○ 사 업 비 : 2,069백만원

○ 사업기간 : 2004 ~ 2006(4개년)

□ 추진실적(전체공정 50%)

○ 국유지사용 대체시설 협약체결(21필지 31,470㎡) -- ’03.11

○ 학군단 방음벽 시설 완료 ------------------------ ’04. 12

○ 운동장 보수등 공사시행 ------------------- ’05.10～‘06.4

※ 2005년도 확보예산 : 900백만원

□ 이후계획

○ 학군단 및 배수BOX 공사 추진 ---------------  ’06. 1 ～  12

교통사고 예방을 위한

구조개선 및 안전시설물 정비

☞교통사고 줄이기 목표

- 자동차 1만대당 사망자 4.5인 ⇒ 2.0인(계획년도 2006년도)

- 자동차보험 지급율 및 손해율 전국의 80%이하 수준으로 개선

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 관내

○ 사업기간 : 2005. 1 ～ 2005.12

○ 사 업 비 : 2,591백만원(국비 341.  시비 2,250)

○ 사업내용

- 교통안전시설 정비 및 차선도색외 5개사업 ---- 1,525백만원

- 사고잦은 지점 불합리한 교차로 구조개선 2개소  --- 50백만원(국비50%)

- LED 신호등 설치 22개 교차로 ------------ 416백만원

- 위치 부적정 신호등 이설 및 가로 안전시설물 집약화 -- 600백만원

□ 추진실적

○ 교통안전시설 확충정비(6개사업 1,525백만원)

- 현 공정 ------------------------  80%

○ LED 신호등 설치사업(22개교차로 416백만원)

- 현 공정 ------------------------  80%

○ 교통사고 잦은 곳 구조개선사업(1개소 50백만원)

- 현지조사 및 설계완료 -----------  ‘05.10.31

○ 위치 부적정 신호등 이설 및 가로 안전시설물 집약화(600백만원)

- 현 공정 ------------------------  85%

□ 이후계획

○ 교통안전시설 확충정비사업 마무리 ----------- 2005.12

○ LED신호등 설치사업 마무리 ---------------- 2005.12

○ 사고 잦은 곳 교차로 구조개선공사 ------------ 2005.12

어린이보호구역 개선사업

□ 사업 개요

○ 총사업량  :  중앙초교외 58개소

○ 사업기간  :  2003 ～ 2006

○ 사 업 비  :  8,871백만원(국비50%,시비50%)

□ 사업내용

구분	년도	사업량	사업비	사 업 내 용	비고
		59개교	8,871
완료	2003	6개교	1,461	중앙,북일,전주,덕진,전라,문정
	2004	9개교	1,020	풍남,인봉,삼천남,효문,선화, 동북,덕일,송원,인후	2005이월사업
	2005	6개교	922	팔복,서신,조촌,서일,진북,기린	본예산 사업
추진중		8개교	1,278	완산서,서천,효자,동신,전주동, 서원,송북초	추경예산 사업
계획	2006	30개교	4,190	완산초교외	예산확보중

□ 추진계획

○ 추경예산 사업

(8개교 ; 완산서, 서천, 효자, 동신, 전주동, 금평, 서원, 송북초)

- 조사 및 측량 : 2005. 9.20 - 10.8

- 관할경찰서 협의 및 지역주민,학부모 의견수렴 : 10.10-10.14

- 설계 및 발주  : 2005. 10.17 - 11.30

- 공사시행 : 2005. 12 ～

□ 문제점 및 대책

○ 2005년도 16개교 정비사업비 2,800백만원중 국비 1,400백만원

확보 되었으나 시비부담액 1,400백만원 미 확보

○ 시비 미확보로 사업추진 애로 - 국비 확보시 시비 적극 반영요망 자전거도로 확충

□ 사업개요

○ 사 업 량 : 자전거도로 99개노선 325㎞

(자전거도로 175, 기타사업 150)

○ 사업기간 : 1997 ～ 2006년(10개년)

○ 사 업 비 : 32,500백만원

□ 추진실적

○ 2004년까지 자전거도로 251㎞(예산사업 105, 비예산사업146)

○ 사 업 비 : 263억원(예산 133,  비예산 130)

□ 이후계획

○ 완주공단 진입로 자전거도로 개설공사

- 위    치 : 송천동 송천육교 ~ 회포대교(백석로)

- 사 업 량 : L=3,570m

- 사 업 비 : 2,364백만원 (’04예산 691, ’05예산 1,673)

- 기    간 : ’05. 12월 말

○ 동서학동 바람쐬는 길 자전거도로 시설공사

- 위    치 : 동서학동 전주천제방부지

- 사 업 량 : L=3,870m

- 사 업 비 : 533백만원

- 기    간 : ’05. 12월

중앙 분리대(화단) 설치

중앙분리대(화단) 설치로 중앙선 침범과 무단횡단으로 인한 교통사고를

예방하여 고귀한 생명과 재산을 보호하고 녹색환경 도시건설

□ 사업개요

○ 설치대상 : 4차선이상 도로(경전철 예정노선 제외)

○ 사 업 량 : 49개 노선  68.9㎞

○ 사 업 비 : 15,000백만원(국 7,500.  시 7,500)

○ 사업기간 : 2002 ～ 2006

□ 추진실적

○ 중앙분리대 정비계획 수립 --------------------- 2003.06

○ 아중로등 10개 노선 19.2㎞ 설치완료

- 투자사업비 : 5,657백만원(국비 2,607.  시비 3,050)

□ 이후계획

○ 위    치 : 노동청앞 신덕1길외 2개 노선

○ 규    모 :  L=2㎞

○ 사 업 비 : 868백만원(국비 434  시비 434)

○ 기    간 : ‘05. 9월착공(11월말 준공예정)

※ 당초 월드컵로의 한전 지중화사업와 병행 시행 할 계획을

지중화사업추진 지연으로 노선변경 시행

자전거타기 활성화

○ 폭증하는 자동차 1천4백만대 시대의 심각한 도시교통 및 환경,

에너지문제 개선

○ 자전거이용의 생활화로 녹색환경도시 건설의 시민의식 전환

□ 추진실적

○ 주말자전거 테마여행 실시     : 10회 1,500명

○ 주부 초보자 자전거교실 운영  : 체련공원(80명)

○ 자전거동호회연합 자전거대행진  : 2005. 5. 7(토) 2,000명

○ 초․중학생 자전거 안전교육 실시  : 3개교 680명

○ 자전거타기 활성화 홍보용 전단배부 : 2회 14,000매

□ 이후계획

○ 주5일 근무에 따른 주말 자전거테마여행 변경시행

- 둘째, 넷째주 금요일(14:30～17:00)로 변경 추진

○ 자전거타기운동 활성화 지속추진 : 시범학교, 자전거테마여행 운영 등

- 자전거동호회 : 매주 1회 자전거타기 실시

○ 주부 초보자 자전거교실 운영 : 2개소(종합경기장, 체련공원)

○ 자전거이용 시범학교 지정운영 : 25개교(중학교 18, 고등학교 7)

○ 자전거 테마여행 지속실시 : 반기별 7회

○ 누구나 손쉽게 이용할 수 있는 자전거이용 켐페인 홍보

- 언론홍보(MBC TV, 라디오)

- 더불어사는전주 게재 홍보 및 자전거 관련 전단배부

서남권 국도대체우회도로

국가사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 완주군 상관～구이～이서～용정～익산시 춘포

○ 사업규모 : 33.4㎞(폭 20m)

○ 사 업 비 : 4,574억원(국비 4,296억  시비 278억)

(※ 국비 조정 ∇290(설계변경) : 당초 4,586)

○ 사업기간 : 1998 ～ 2010년(13년)

○ 시 행 청 : 익산지방국토관리청(보상 : 전주시)

□ 추진실적

○ 총 공 정 : 77%(공사 69%  보상 85%)

○ 투자실적 : 3,475억원(국비 3,260  시비 215)

- 2005년 예산확보 : 183억원(국비 162  시비 21)

○ 상관 ∼ 구이간 (L = 8.9㎞) 개통 ----------- 2005.4.20

○ 구이～이서구간 보상완료 : 28,749㎡( 8,697평) /  71필지

□ 이후계획

○ 총 63억원(시비)을 확보하여 2개 공구 보상시행(156필지 85,402평)

- 이서~용정 :  37,137㎡(11,253평) /  41필지

- 용정~춘포 : 244,692㎡(74,149평) / 115필지

○ 구이~이서~용정간 2006년말, 용정~춘포간 2010년도 등

연차적으로 개통할 계획

○ 갈동유적지 현장보존에 따른 선형변경 추진(L = 2.3㎞)

➲ 2006년 예산확보 계획 : 총 565억원(국비 535억, 시비 30억)

※ 건설교통부 반영예산 : 229억원(부족 306억원)

⇨ 국회예결위원회에 부족한 국비확보 적극 건의추진

북부권 국도대체우회도로

국가사업

□ 사업개요

○ 사업구간 : 조촌 용정～아중역(금회)～동서학동 색장리(장래)

○ 사업규모 : 연장 18.6㎞(폭 20m)

○ 사업기간 : 2003 ～ 2011년(9년)

○ 사 업 비 : 약3,040억원(국비 2,790  시비 250)

○ 시 행 청 : 익산지방국토관리청(보상 : 전주시)

□ 추진실적

○ 기본 및 실시설계 용역중(47억원) - 2003.07~2005.11월말

○ 노선확정(건설교통부) ----------------------- 2004.11.26

- 조촌 용정 ～ 용진 ～ 산정동 ～ 아중역(제방도로 이용) 18.6㎞

※ 우리시에서 요구한 노선으로 확정

○ 환경․교통․재해영향평가서 초안 공람공고 및 주민 설명회 개최(2005. 1.18)

○ 완주군 용진면 지역주민 노선변경 민원발생 --- 2005. 2. 5

⇨ 당초 노선안으로 결정(익산지방국토관리청)

○ 교통영향평가 의결(조촌 용정∼ 완주 용진)

□ 이후계획

○ 기본 및 실시설계 용역 완료 ------------------- 2005.11

○ 공사발주 및 착공 ----------------------------- 2005.12

- 1공구 우선발주(조촌 용정∼ 완주 용진)

: 전라북도 교통영향평가심의위원회 의결(2005. 10.28)

➲ 2006년 예산확보 계획 : 총 149억원(국비 140억, 시비 9억)

※ 건설교통부 반영예산 : 49억원(부족 91억원)

⇨ 국회예결위원회에 부족한 국비확보 적극 건의추진

교통행정과  소 관

ꊱ	녹색주차마을(Green Parking)시범 조성 -	48
ꊲ	주차수급실태 조사 용역 ------------------	49
ꊳ	버스업계 경영개선으로 서비스 극대화 -----	50

녹색주차마을(Green Parking)시범 조성

	필 요 성
○ 주택가 주차문제 해결, 생활환경 개선, 교통안전 등을 종합적으로 접근한 주차 표준모델로 조성하여 시민 삶의 질 향상 - 내집 주차장 설치 + 담장허물기 + 녹지공간 확충 + 이면도로 정비 ⇨ 사업계획 단계부터 사후관리까지 주민 주도로 의사결정을 함으로서 지역 커뮤니티 활성화

□ 기본방향

○ 시범사업을 통한 표준모델 조성후 지속적으로 사업추진

- 구청별 1개소씩 시범지역 조성(2005~2006)

○ 주민 중심 추진위원회 구성으로 지역주민 참여형 사업 시행

○ 주거환경 개선과 교통안전을 도모하면서 주차공간 100% 확보

○ 보행위주의 도로정비 및 지역특성을 살린 가로 조경 조성

□ 추진실적

○ 추진계획 수립 및 사업시행 매뉴얼 작성 : ‘05. 5

○ 시범지구 선정을 위한 기초조사 실시 : ‘05. 5 ~ 8

○ 그린파킹조성사업 실시설계 용역발주 : ‘05. 9. 28

- 위    치 : 전주시 관내 2개 지역(완산1, 덕진1)

- 용역기간 : ‘05. 11 ~ ’06. 2(용역비 68,420천원)

□ 이후 추진계획

○ 시범대상지구 선정(2개소-시범지역 선정위원회 구성) : ‘05. 11

○ 시범지구 주민 및 유관기관 협의체(경찰, 한전, 소방서, 상수도

도시가스 등) 구성 : ‘05. 11

○ 주민설명회 및 워크샾 개최 : ‘05. 11 ~ ’06. 2

○ 담장허물기 대상가구 신청접수 : ‘05. 11 ~ ’06. 3

○ 시범지역 그린파킹 조성사업 추진 : ‘06. 5 ~ ’06. 11

주차수급실태 조사용역

	필 요 성
○ 주차장의 설치 및 관리를 위한 기초 자료로 활용하기 위하여 정기적으로 주차장 수급실태조사 의무 규정 (주차장법 제3조 : 2003.12.31 신설) ○ 그 동안 주차장 수급실태에 대한 정확한 기초 자료가 없어 공공주차장 건설, 주택가 주차관리 등 체계적인 주차정책 추진에 애로

□ 실태조사 내용

○ 행정구역, 용도지역, 용도지구 등을 고려한 조사구역 설정

- 조사구역 경계선이 300m이내의 사각형 또는 삼각형 형태

- 조사구역은 건축법규정에 의한 도로를 경계로 구분

○ 주차수요와 주차시설 현황을 구분하여 실태조사

○ 주차수급 실태조사의 주기는 매 2년마다 조사

□ 추진실적

○ 주차수급실태조사 용역 발주 : ‘05. 10. 4

- 위    치 : 전주시 전 지역 (도심지역 중심)

- 용역기간 : ‘05. 11 ~ ’06. 5

- 용 역 비 : 131,966천원

□ 이후계획

○ 용역 결과에 따라 블록별 주차 정책 추진

○ 주차장확보율이 낮은 구역은ꡒ주차환경 개선지구ꡓ로 지정

사업우선 시행

○ 그린파킹제, 거주자우선주차제 등 구역별 특성에 맞는 사업시행

버스업계 경영개선으로 서비스 극대화

□ 사업개요

○ 재정지원 : 2,894백만원(도비947  시비1,947)

○ 대․폐차지원 : 80대 400백만원(대당 5백만원/시비)

○ 유가보조금 : 20,500백만원(버스, 택시, 화물)

- 본예산 : 6,000백만원     - 1회 추경 : 14,500백만원

□ 추진실적

○ 재정지원금등 지원금 적기 지원

- 적자노선 재정지원금 : 5개사 2,171백만원

- 노후차량 대․폐차 지원금 : 57대 285백만원

- 벽지노선 손실보상금 지원 : 6개노선 44백만원

- 시외버스 터미널 정비사업 지원 : 124백만원

○ 버스업계 유가보조금 지원

- 지원실적 : 9개사 5,063백만원(2005. 8월분까지)

※ 소요예산 결산추경 확보 ⇨ 4,800백만원 추가 소요

○ 이용자 및 운전자 편의를 위한 회차지 정비사업 추진 -- ’05.07～’05.10

- 소요예산 : 50백만원(노면 덧씌우기30, 화장실 신축20)

□ 이후계획

○ 시내버스 경영분석 용역 : ’04. 12 ∼ ’05. 12

- 경영수지 실태조사, 표준원가 산정, 경영합리화 방안 제시 등

○ 시내버스 노선조정 및 환승제 도입 : ’05. 7 ～ ’06. 2

교통기획팀  소 관

ꊱ	경전철건설로 고품질 교통서비스 제공 -----	52
ꊲ	시내버스정보화(BIS) 구축사업 -----------	53
ꊳ	교통신호체계 통합 및 정보센터 장비 보강 ---	54
ꊴ	전국단위 표준 노드/링크 DB 연계 구축 --	55

경전철 건설로 고품질교통서비스 제공

자동차의 급증과 도로시설 공급의 한계로 인하여 계속 심화되고 있는

도심지역의 심각한 교통난 해소 및 고품질의 대중교통서비스 제공

- 정시성, 안전성, 대량수송이 가능한 무공해 신 대중교통수단 도입 -

□ 사업개요

○ 시스템 및 노선연장 : 노면전차(Tram) 24.29㎞

- 1단계 : 송천역～한방병원～팔달로～평화광장～삼천농협공판장(14.19㎞)

- 2단계 : 전주역～백제로～곰솔나무길～평화광장～평화 3지구(10.10㎞)

○ 사 업 비 : 4,671억원(국비930 도비465 시비487 민자2,789)

○ 사업기간 : 2001～2013(13년간)

○ 개통목표 : 1단계 2010년,  2단계 2013년

□ 추진실적

○ 전주경전철 기본설계용역 계약(동명기술공단)   ---- ’04.12.09

○ 도시철도기본계획 승인요청(전주시⇨건설교통부) ---- ’04.12.24

○ 도시철도기본계획 승인(건설교통부)                ---- ’05.10.17

□ 이후계획

○ 민간투자대상사업 지정 및 기본계획(안) 승인신청    ---- ’05.11

○ 전주경전철 기본설계 용역 준공 ---------------- ’05.12

○ 민간투자 시설사업 기본계획승인 및 고시 (사업자모집)-- ’06.01

○ 민간투자 시설사업계획서 접수 및 협상 대상자 선정--- ’06.07

○ 민간투자 실시협약 체결   ---------------------- ’07.03

○ 사업 실시계획 수립 및 승인 요청(사업자) ------- ’07.10

○ 실시계획승인 및 1단계 사업착공  --------------- ’08.01

○ 1단계 사업완료 및 2단계 사업착공 ----------- 2010.12

○ 2단계 사업 완료                 -------------  2013.06

시내버스정보화(BIS) 구축사업(2단계)

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2005.06 ~ 2006.02

○ 사 업 비 : 1,300백만원

○ 사업내용 : 정류장안내단말기 30개, 노변기지국 40개,

노선번호표시기 316개 등

※ 년도별 추진 내역

구 분		계	2004까지 (1단계)	2005년 (2단계)	2006년 (3단계)
사 업 비		11,160 백만원	4,160	1,300	5,700
사업규모	정류장안내기	400 개	104	30	266
	노변기지국	500 개	193	40	267
	노선번호표시기	410 개	94	316	-
	차량내안내기	410 개	94	-	316
	버스단말기	410 개	410	-	-
	차량통신장치	410 개	410	-	-

□ 추진실적

○ 1단계 사업 완료 ---------------- ’03.10.06~’04.08.30

○ 사업자(한전KDN(주))선정 및 계약체결  ------- ’05.06.09

○ 2단계 사업착수   ----------------------------- ’05.06.16

- 도로굴착 및 전기/통신 인입공사 : 80%공정(‘05.11.10현재)

- 노선번호기 설치: 316대 (100%)

- 승강장안내기 30개,노변기지국 40개 구축 ---- ’05.12월까지

□ 이후계획

○ 시험운영             ------------------- ’05.12~’06.01

○ 2단계 사업완료(준공) ------------------- ’06.02

교통신호체계 통합 및 정보센터 장비보강

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2004.12～2005.12

○ 사 업 비 : 4,400백만원 (국비)

○ 사업내용

- 이원화된 신호운영체계 통합시스템 구축 1식

- 교통신호제어기 교체 149대, 신호연동화 1식

- CCTV 3개소 설치, 광케이블 회선 확장 1.8㎞

- 어린이교통안전 교육실 신설 1식(262㎡)

□ 추진실적

○ 기본설계 ------------------------------ ’04.02～’04.05

○ 사업착수 (사업자:(주) 케이티 컨소시엄) --- ’04.12.14

○ 시설장비 교체 및 통합시스템 구축 -----  ’05.04～’05.10

- 광케이블 1.8㎞, CCTV 3개소, 관제실 상황판 교체

- 주요 교차로 교통량조사(323개소) 및 연동DB구축

- 신호제어기 149대  교체 및 이설,  검지기 20개소 교체

- 통합신호시스템 구축 및 제어기 ROM교체(181개소)

○ 신호체계 연동화 개선 조정      -------  ’05.09～’05.11

- 현시체계(40 교차로), 현시순서(41 교차로), 신호표시 교체 등

※  전체 공정율 : 90%

□ 이후계획

○ 어린이 교통안전 교육체험실 증축(옥상층)---- ’05.09～’05.12

○ 신호 연동화 개선에 따른 시험운영 및 사업완료 - ’05.10～’05.12

○ 엘리베이터(15인승/1000㎏) 구축  ------ ’05.11～’06.02

전국단위 표준 노드/링크 DB 연계구축

○ 전국 고속국도 및 국도, 지방도의 표준 교통망(노드/링크)구축

사업과 연계하여 현장조사를 통한 국도, 지방도의 표준 노드/

링크 DB 사업추진

- 현재 지자체별로 노드/링크 ID 체계를 구성하여 이용하고

있으며, ID를 구성하는 속성을 포함하여 ID체계가 각각

달라 교통정보 교환이 원활하게 이루어지지 못하고 있는 실정임

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2005.02~2005.12

○ 사 업 비 : 198백만원(국비)

○ 사업내용

- 관내 6M이상의 모든 도로를 대상으로 표준 교통망(노드/링크) 부여

- 구축된 DB를 건교부 교통종합정보센터와 연계하는 시스템 구축

- 전국 고속도로 및 국도,지방도의 표준 표준 노드/링크구축 사업과 연계

□ 추진실적

○ 전국단위 노드/링크 DB 구축을 위한 협약서 체결  : ‘04.11월

- 건설교통부 ⇔ 전주시장

○ 전국단위 표준 노드/링크 DB 구축 사업관리용역 계약체결

- 사업관리업체(국토연구원)

○ 공동추진 협약서 체결(12개 자치단체⇔국토연구원) : ‘05.08.09

○ 본 사업 계약체결(KT및선도소프트 컨소시엄)  : ‘05.10.10

□ 이후계획

○ 본 사업 추진 완료 ------------------------ ’05. 12. 16

재난 안전 관리과 소관

ꊱ	하수처리장 1‧2단계 고도처리사업 --------	57
ꊲ	하수처리장 슬러지처리 시설사업 ----------	58
ꊳ	하수처리장 민간위탁 관리 ----------------	59
ꊴ	화산․덕진처리구역 하수관거 정비사업 -----	60
ꊵ	농촌마을 하수도 정비사업 ----------------	61
ꊶ	하수관거정비(BTL)민간투자사업----------	62
ꊷ	삼천 자연형하천 조성사업 -------------------	63
ꊸ	만경강 생태하천 가꾸기사업 -----------------	64
ꊹ	전주천 자연형하천 정화사업 -----------------	65
	만경강수계치수 중복천 개수공사 -------------	66
	지방2급 하천정비기본계획수립 용역 ----------	67
	재난 방재 업무추진 ------------------------	68
	8.2~8.3 수해복구사업 추진 -------------	70

하수처리장 1‧2단계 고도처리사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 송천동 2가 환경사업소 내

○ 사업규모 : 303천톤/일

○ 사업기간 : 2002.03 ～ 2007.04(5개년간)

○ 총사업비 : 60,000백만원(국 30,000  지 30,000)

- 연도별 투자계획                        (단위 : 백만원)

재원별	총 사업비	2004 까지	2005 계획	2006 이후	비 고
계	60,000	29,560	747	29,693
국 비	30,000	17,615	498	11,887
지방비	30,000	11,945	249	17,806

○ 사업내용 : 고도처리공법 시설개선(표준활성법 ➪ CNR공법)

※ 주요 수질기준

구 분	BOD	COD	SS	T-N	T-P	비 고
당 초	20	40	20	60	8
변 경	10	20	10	20	2

□ 추진실적

○ 턴키방식의 설계적격심의 완료 ---------------- 2004.09

○ 공 사 착 공(30개월)  ----------------------- 2004.10

○ 공동구, 방류펌프장 구조물공사 완료         ---- 2005.11

○ 2단계 고도처리 공정(150천톤/일) 완료 ------- 2005.11

□ 이후계획

○ 2단계 고도처리 공정(50천톤/일) 완료  ------- 2005.12

○ 1단계 고도처리 공정(103천톤/일) 완료 ------- 2006.09

○ 전기, 기계, 계장설비  완료  ------------------ 2006.10

○ 시운전(6개월) 및 사업준공  ------------------- 2007.04

하수처리장 슬러지처리 시설사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 송천동 2가 환경사업소내

○ 사업규모 : 150톤/일

○ 사업기간 : 2003 ～ 2008.12(6개년간)

○ 총사업비 : 14,000백만원(국비 7,000  지방비 7,000)

※ 2005년 예산 : 4,883백만원(국비 3,983  지방비 900)

□ 추진실적

○ 전주시 설계자문회의  ------------------------- 2003.03

○ 관계전문가 자문(전주시 자문위원 전문가 9명) -- 2004.06

○ 기본 및 실시설계 중지중(진도 60%) ------------2004.12

※ 민원발생 및 도비확보.공법.처리비용 발주방법 검토중

□ 이후계획

○ 실시설계 완료 --------------------------------  2006.10

○ 환경성검토 및 실시계획인가등 행정절차 이행 ------- 2006.12

○ 슬러지 처리시설 착공 -------------------------- 2007.03

○ 공사준공 및 운영  ----------------------------- 2008.12

하수처리장 민간위탁 관리

□ 현  황

○ 위    치 : 전주시 덕진구 송천동 1130번지 일원

○ 규    모 : 403,000㎥/일 (분뇨처리량 : 290㎘/일)

○ 기    간 : 2004. 12. 1 ～ 2024. 12(20년간)

○ 민간위탁 소요 운영비 : 7,644백만원

□ 추진실적

○ 운영수질                                     (단위㎎/ℓ)

항목 구분	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균	비고
1․2단계	14	27	14	14	1	998	협약수질이하
3단계	4	9	4	8	1	167	법정수질이하

○ 하수처리장 운영관리상태 지도. 점검-- 19회(수시 15회,특별 4회)    ○ 하수처리장 방류수 수질검사 ---------- 7회(자체 4회,환경청 3회)

○ 송풍기등 하수처리 주요설비 대수선 공사 추진 ------ 2개소

□ 이후계획

○ 외부전문가 참여팀 구성 운영관리 실태 정기점검----- 분기 1회

○ 하수처리 공정별 운영상태 수시점검 ----------------- 주 1회

○ 방류수 수질기준 준수여부 수시 확인 --------------- 분기1회

○ 차집관로 유지관리 철저로 불명수 유입 사전예방 ------- 매주

화산 ․덕진처리구역 하수관거 정비사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 화산처리구역 1․4․7분구, 덕진처리구역 1분구

○ 사업규모 : 관거정비 70㎞

○ 사업기간 : 2004.03 ～ 2008.04 (5개년간)

○ 사 업 비 : 39,728백만원(국비 19,583  시비 20,145)

- 연도별 투자계획                        (단위 : 백만원)

재원별	총 사업비	2004 까지	2005 계획	2006 이후	비 고
계	39,728	7,781	18,588	13,359
국 비	19,583	3,952	9,294	6,337
지방비	20,145	3,829	9,294	7,022

□ 추진실적

○ 기본 및 실시설계 완료         ----------------- 2003.09

○ 시공업체선정(조달청) 및 착공  ----------------- 2004.04

○ 관련 주민 사업설명회 개최     ----------------- 2004.06

○ 1,2차공사 (동서학동 산성천주변, 덕진동 호반촌)완료 - 2005.09

- 관거정비 L= 5.2Km, 배수설비 288세대

○ 3차공사 시행(전북대병원 주변) ----------------- 30%

- 관거정비 L= 12.5Km, 배수설비 758세대

□ 이후계획

○ 3차 구간 공사완료 및 잔여구간착공------------- 2006.11

○ 전체 사업 준공        ------------------------ 2008.04

농촌마을 하수도 정비사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 관내 하수처리구역내 농촌마을

○ 사업대상 : 3개마을(동서학동 내․외원당, 객사)

○ 사업규모 : 하수관거정비 L= 8.5Km

○ 사업기간 : 2005 ～ 2007(3개년간)

○ 총사업비 : 2,272백만원(국비 1,135  시비 1,137)

- 연도별 추진계획                              (단위: 백만원)

재원별	총 사업비	2005 계획	2006 계획	비 고
계	2,272	735	1,537
국 비	1,135	476	659
시 비	1,137	259	878

□ 추진실적

○ 전수 실태조사  -------------------------------- 2004.07

○ 사업적정 후보마을 선정(3개소 5개마을) -------- 2004.09

○ 사업계획 확정 통보(환경부) -------------------- 2004.12

○ 기본계획 및 실시설계 용역완료  ---------------- 2005.11

□ 이후계획

○ 설계자문위원회 자문 및 설계 사전심사     ------ 2005.11

○ 공사발주 및 착공 ------------------------------ 2005.12

○ 전체 사업 준공 -------------------------------- 2007.12

하수관거정비(BTL)민간투자사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 일원(덕진, 아중, 중앙, 화산, 효자처리구)

○ 사 업 량 : 하수관거 정비(우․오수 분리) L = 127Km

○ 사 업 비 : 1,099억원

○ 사업기간 : 2005 ～ 2009(40개월)

○ 사업방식 : 민간완공. 이전. 임대방식 (B.T.L)

□ 추진사항

○ 참여의견서 제출(시→환경부)  ------------------ 2005. 4.18

○ 환경시설 민자사업 심의위원회(환경관리공단) ----- 2005. 5.25

○ 도비지원요청 및 지원계획 통보(시↔도) ---------- 2005. 6.03

○ 업무 위.수탁 협약 체결(환경관리공단)------------ 2005. 6.09

○ 하수관거정비 BTL 기본계획고시(시) ------------------ 2005. 6.17

○ 시의회 의무부담행위 동의안 승인 --------------- 2005. 9 .09

○ 사업계획서 평가 및 우선협상대상자 선정 --------- 2005. 10.13

□ 이후계획

○ 우선협상 대상자와 협상 및 협약체결        ---------- 2005. 12.

○ 최종 사업자선정 및 우선시공분 공사착공    ---------- 2005. 12.

○ 시설사업 실시계획 승인(환경부)         ------------- 2006. 06.

○ 사업 준공후 기부체납 임대 유지관리 착수(20년간) --- 2009. 12.

삼천 자연형하천 조성사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 삼천동 삼천교 ～ 추천대교

○ 사업규모 : 8.05㎞

○ 사업기간 : 2001 ～ 2006(6개년간)

○ 총사업비 : 13,068백만원(양여금5,029 국비2,812 시비5,227)

○ 연도별 투자계획                              (단위 : 백만원)

재원별	총 사업비	2004까지	2005계획	2006이후	비 고
계	13,068	8,229	2,400	2,439
국 비	7,841	5,029	1,165	1,647
시 비	5,227	3,200	1,235	792

□ 추진실적

○ 공사착공 -------------------------------------- 2001.12

○ 차집관로 매설(1.6㎞) 완료 --------------------- 2002.09

○ 낙차공개량 및 어도설치(3개소) 완료 ------------ 2003.07

○ 수질정화습지(1개소), 자연석쌓기(3.26㎞) 완료 ----- 2005.10

○ 교량공사 구간 제외 자전거도로 개설(11.7㎞) 완료 - 2005.10

□ 이후계획

○ 자연형호안(자연석쌓기) 조성 0.8㎞, 산책로겸 자전거도로 1.4㎞

○ 진입계단 14, 진출입로 21, 휴게소 및 체육시설 9개소 등 사업마무리

※ 삼천 녹색관광 자원화 조성사업 별도 추진중(녹지공원과)

○ 전체 사업 준공 -------------------------------- 2006.12

만경강 생태하천 가꾸기사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 팔복동 추천대교 ～ 만경강 합류

○ 사업규모 : 7.9㎞(전주천 5.7㎞  만경강 2.2㎞)

○ 사업기간 : 2001 ～ 2010(10개년)

○ 총사업비 : 16,637백만원

○ 연도별 투자계획                                      (단위 : 백만원)

재원별	총사업비	2004까지	2005계획	2006이후	비 고
계	16,637	3,898	646	12,093
국 비	10,772	3,078	323	7,371
도 비	598	258	-	340
시 비	5,267	562	323	4,382

□ 추진실적

○ 일반하천 개수사업 공사 착공 ------------------- 2002.12

○ 일반하천 개수사업 공사 준공 ------------------- 2003.12

○ 만경강 생태하천 가꾸기사업 공사 착공 ---------- 2004.11

○ 산책로겸자전거도로개설(7.0㎞)완료-------------- 2005.10

○ 자연형 호안공사(2.5㎞)완료 -------------------  2005.10

□ 이후계획

○ 휴게공간시설 5개소 및 운동시설 4개소 설치 ----- 2005.12

○ 자연형호안공사(저수호안 조경석쌓기 0.3㎞) 완공 -----  2006.03

○ 산책로겸 자전거도로(만경강까지 좌,우안 6.2㎞) 완공 ---- 2006.03

○ 전체 사업 준공 -------------------------------  2010.12

전주천 자연형하천 정화사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 교동 한벽보 ～ 덕진동 삼천합류점 (7.2㎞)

○ 사업내용 : 수질개선, 하천유지용수 확보, 친수시설 보완

하천생태계복원(어도개량)

○ 사업기간 : 2005 ～ 2006(2개년)

○ 총사업비 : 1,543백만원 (국비 1,080  시비 463)

○ 연도별 투자계획                                (단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	2005 계획	2006 이후	비 고
계	1,543	575	968
국 비	894	345	549
시 비	649	230	419

□ 추진실적

○ 전주천 자연형하천 조성사업 완공  ---------------- 2002.12

○ 실시설계 용역계약시행 ---------------------------  2005.04

- 징검여울, 소, 어도 등 생태환경 개선 및 보완

- 수생식물 식재, 징검다리 보수․보강

○ 실시설계 용역 완료 ------------------------------  2005.10

□ 이후계획

○ 공사 착공 ------------------------------------  2005.12

○ 공사 준공 ------------------------------------  2006.12

만경강수계치수 중복천 개수공사

□ 사업개요

○ 위    치 : 삼천동 쑥고개길아래 ～ 효자동 삼천합류점(3.5㎞)

○ 사업내용 : 축제및호안 5,678m, 교량가설 10개소,

보 및 낙차공 4개소, 기타 시설물등

○ 사업기간 : 2004 ～ 2010(7개년)

○ 총사업비 : 32,000백만원 (익산청 수탁사업 - 전액국비)

○ 연도별 투자계획                                (단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	2004까지	2005 계획	2006 이후	비 고
계	32,000	100	2,000	29,900
국 비	32,000	100	2,000	29,900

□ 추진실적

○중복천개수 위․수탁공사 협약 체결(익산청) ----- 2003.12

○ 토지 및 지장물보상 협의 시작 ---------------- 2005. 8～

○ 공사 총괄발주 및 1차분 공사 착공 ------------- 2005.11

□ 이후계획

○ 전체 사업 준공 ------------------------------- 2010.12

지방2급 하천정비기본계획수립 용역

□ 사업개요

○ 대상하천

계	2004년까지	2005계획	2006년이후	비 고
26	8	9 (소양천 도 추진중)	9

○ 소요사업비 : 716백만원(1회추경 496,  04명시 220)

○ 추 진 기 간 : 2005. 10 ～ 2006. 10 (2개년간)

□ 추진실적

○ 용역과제 심의위원회 심의완료 -------------- 2002.12.18

○ 도비 확보(279백만원) ---------------------- 2005.06.27

○ 7개 하천에 대한 기본계획수립 용역착수 ----- 2005.10.04

○ 1개 하천(운교천) 집행잔액활용 추진중 ------- 2005.11월중

□ 이후계획

○ 나머지 9개하천 용역비확보(10억원) 용역착수 ----- 2006.03

○ 하천정비기본계획수립 용역 중간보고(4회) ------- 매분기별

○ 하천정비기본계획 승인절차 이행(시⇒전라북도) -- 2006.09

○ 하천정비기본계획수립 용역 준공 ---------------- 2006.12

재난 방재 업무추진

□ 현   황

○ 특정관리대상시설

구 분	총 계	중점관관리대상시설				재난위험시설 D등급
		소계	A등급	B등급	C등급
합 계	1,243	1,228	1,116	67	45	15
건축물	1,216	1,202	1,108	58	36	14
시설물	27	26	8	9	9	1

○ 재난기금 관리 현황                           (단위 : 백만원)

구 분	2004년 이월금액	‘05년 기금현황		‘06년이월예정액	미확보액
		조성액	집행예정액
재난관리기금	6,875	1,786	1,782	6,879	502(99년)

○ ‘05년 기상특보 및 인위 재난발생 현황

강 풍	호우특보	화 재	윤 화	기 타
2	7	352	2,896

□ 추진실적

○ 해빙기, 우기대비 안전점검  및 위험시설 정비 : 9개소(745백만원)

○ 재난대비 실제훈련 : 6. 23 서신동 소재 지리산 빌딩

○ 국가재난대응 종합훈련(CPX) : 4. 20 ~ 4. 22일

○ 안전점검의 날 행사 : 매월 4일 객사앞 등에서 14회 시행

○ 재난 홍보 달력 제작(1,600부) : 유관기관, 시민등 배포

○ 재난 상황실 운영 : 5.15 ~ 10.15일(5개월)

○ 안전관리 계획 수립및 표준 메뉴얼 제정 : 2005. 4. 20일

□ 이후계획

○ 행락철 및 동절기 대비 각종시설에 대한 사전안전 점검

- 유원시설, 위락시설 및 신종업종, 공연시설, 대형판매시설, 종교시설 등

- 담당유지 관리부서, 유관기관 합동점검

○ 동절기 방재기간 운영 : 2005. 12. 1 ~ 2006. 3. 15

- 강설에 따른 도로교통 및 농축산 대책 수립 및 상황실 운영

- 설해대책기간 운영으로 시민 피해 및 불편 최소화

8.2~8.3 수해복구사업 추진

□ 사업개요

○ 재원 현황                                  (단위: 백만원)

구 분	총복구액	국 비	도 비	시 비	자부담	의연금
계	25,275	17,571	2,951	4,098	592	63
사유시설	1,810	999	66	90	592	63
공공시설	23,465	16,572	2,885	4,008	-

※ 자부담내용 : 주택파손336, 농경지복구166, 기타 90

○ 공공시설 현황                          (단위:개소, 백만원)

구 분	합 계	도 로	하 천	상하수도	수리시설	사방임도	기 타
수 량	107	7	23	4	20	12	41
복구액	23,465	1,906	11,191	2,071	2,735	1,650	3,912

□ 추진실적

○ 호우피해 복구계획 확정통보(소방방재청) -------- '05. 9. 1

○ 예산성립전 사용승인 및 실시설계 용역․공사 발주 --'05. 9.25

※ 실시설계중82건(76%), 공사발주 및 착수 23건(22%), 완료2건(2%)

□ 이후계획

○ 수해 항구복구공사 년내 착공 --------------------- '05.12

○ 항구복구 2006년 우기전 완료 -------------------- '06. 6

※ 금년말 이전완공 54건, 내년 우기전 완료 53건

도시발전기획단 소관

ꊱ	전주서부신시가지 도시개발사업 -----------	72
ꊲ	전주도시첨단산업단지 조성사업 ----------	73
ꊳ	35사단 일대 에코타운 조성 --------------	74

전주서부신시가지 도시개발사업

ꏅ 사업개요

○ 사업규모 : 기반조성 76만평, 교량 3개소, 비위생매립쓰레기처리

○ 사업기간 : 1999 ~ 2007

○ 사 업 비 : 4,185억원

ꏅ 추진실적 ── 2,276억원(공사1,117,보상 909,기타 250)

○ 기반조성공사 추진

- 도청사 주변 5 개로선  3.5 ㎞ 개설 및 효자다리 준공 개통

- 비위생 매립폐기물 처리,제1매립장 완료 및 제2매립장 조성중

- 홍산교 가설 및 이동교 PIER 기초공사 완료

- 우전로 개설공사(기전여중고~서곡지구)추진 : 600m(B=35m)

․300m개설 반폭 포장완료 및 나머지구간 토공작업중

○ 문화재 발굴 조사 추진중 : 기전여중고뒤등 일부구간 발굴조사 완료

○ 조경공사 추진 : 도청사앞 제3호 근린공원 조성중

○ 편입토지 및 지장물 보상 추진 (95%)

- 대  상 :  3,647 건  959 억원 / 실적 3,379 건  909 억원

○ 체비지 매각 (76%)

- 계  획 :  680 필지  3,972 억원 / 실 적  323필지  3,036 억원

ꏅ 문제점 및 대책

○ 사업지구 구릉지 대부분이 문화재 발굴 작업이 진행되어 토량

확보가 어려워 예정 공정보다 부진

- 기전여중고뒤 외1개소에 대해 발굴작업이 완료되어 토공작업이

진행중에 있어 앞으로 부진공정 만회

- 발굴 조사가 완료되는 구역별로 문화재 지도위원회를 개최하여 사업추진

ꏅ 이후계획

○ 편입토지및 지장물보상 완료(미협의자 토지수용:11월중) -- 2006. 03

○ 문화재 발굴 및 문학대이전 완료      -------------------  2006. 03

○ 도시개발사업 완공                 --------------------- 2007. 02

○ 환지확정측량 및 처분절차 이행    -------------------  2007. 03

○ 사업정산완료                     ------------------ 2007. 12

전주도시첨단산업단지 조성사업

ꏅ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 팔복동 2가 727 일원(도 공무원교육원 인근)

○ 사업규모 : 단지조성 108,580㎡(32,845평)

○ 사 업 비 : 262억원(기반조성 84억, 용지보상 167억, 기타 11억)

○ 사업기간 : 2004 ~ 2007(4년간)

ꏅ 그간 추진상황

○ 도시첨단산업단지단지 지정 승인                : 2004.09.08

○ 도시첨단산업단지 실시계획 승인                : 2004.12.24

○ 문화재 발굴조사 완료                          : 2005.12.05

○ 기반조성공사 착공                             : 2005.10.27

○ 보상실적 : 378건 16,743백만원 / 341건 16,271백만원(97.2%)

ꏅ 문 제 점

○ 기반조성공사 사업비 84억원중 64억원 미확보로 사업기간내

공사 완료 지난

ꏅ 이후계획

○ 단지조성공사 1차 계약분 추진

○ 문화재 발굴조사 용역 완료

35사단 일대 애코 타운 조성

	추 진 배 경
○ ’53년 창설된 향토사단은 전주시 북부권의 중심축에 위치하여 도시의 기형적 팽창을 불가피 하게 하는등 전주 북부권 발전 저해 ○ 전주~익산~군산 광역연담도시권 형성을 위한 도시개발을 위해 이전을 추진하고, 군주둔지 주변 60만평을 미래형 친환경 주거 단지로 조성

ꏅ 사업 개요

○ 군부대 이전 44.6만평 (35사단 35만평, 206항공대 9.56만평)

○ 시가화예정용지 개발 : 60만평

○ 사업기간 : 2006 ～ 2013 (8년간)

ꏅ 그간 추진상황

○ 기부대양여 방식에 의한 이전협의 승인  : ’02. 8. 16

○ 합의각서(안) 작성 국방부 승인 요청    : ‘05. 7. 28

ꏅ 문 제 점

○ 이전 지역인 임실지역 주민들 대부분이 찬성하나 일부 반대

○ 206항공대는 별도 이전협의 중

※ 11월중 국방부 합의각서“안” 승인예정

ꏅ 대    책

○ 합의각서 체결 후 임실군과 적극적인 주민설득

○ 206항공대 이전 협의 적극 추진

ꏅ 2006년도 추진계획

○ 민간사업자 선정 및 협약체결

○ 실시설계, 문화재 지표조사, 교통․환경영향평가 착수

○ 206항공대 이전 합의각서 체결

차량등록사업소 소관

ꊱ	건설기계등록증 우편발송 서비스 ----------	76
ꊲ	휴지신고차량 검사 자동연기 서비스 --------	77
ꊳ	자동차 회수번호판 폐기방법 개선 ----------	78

건설기계 등록증 우편 발송 서비스

건설기계 신규 및 이전등록 신청시 민원인의 2회 방문

처리에 따른 불편 해소

□ 서비스 개요

○ 건설기계 등록신청 민원인의 편의 제공(2회방문 → 1회)

○ 기존 업무처리 절차

	등록신청 접수	⇒	처 리	⇒	등록증 수령

(민원 1회 방문)                       (민원 2회 방문)

○ 개선 서비스 절차

	등록신청 접수	⇒	처 리	⇒	등록증 우편 발송

(민원 1회 방문)

□ 추진실적

○ 건설기계 협회 도지회등 관련 단체 홍보

○ 안내문 게첨 홍보(게시판, 민원창구) : 2개소

※ 서비스 건수 :  65건 ( 10. 31 현재)

□ 이후계획

○ 민원 접수시 우편 수령방법의 지속적인 홍보 강화

⇒ 민원인의 시간적, 경제적 편의 제공

휴지신고차량 검사 자동연기 서비스

영업용 자동차 휴지신고만으로 자동차 검사 및 점검 유효기간을   자동으로 연장해 줌으로써 민원인 편의 제공

□ 서비스 개요

○ 휴지신고기관 통보공문으로 자동 검사연기 처리(2회방문→1회)

	휴지 신청	⇒	공문 통보	⇒	검사 연기신청

(1회 방문)                        (※기존:2회방문 신청)

※ 휴지 신고 기관

- 렌트카, 버  스 : 도청 교통물류과

- 택시, 전세버스 : 시청 교통과

- 화물 자동차 : 전북화물자동차운송사업협회

□ 추진실적

○ 분야별 담당자(6명) 직무 연찬

○ 관련기관 및 단체 협조 및 홍보 공문 발송

○ 안내문 게첨 홍보(게시판, 민원창구) : 2개소

※ 서비스 건수 :  97건 ( 10.31 현재)

□ 이후계획

○ 영업용 자동차 등록신청시 지속적인 홍보 강화

자동차 회수번호판 폐기방법 개선

회수 번호판을 행정기관에서 직접 폐기함으로써 번호판

미회수 차량의 불법운행 방지와 회수 번호판 매각으로

세외수입 증대

□ 사업개요

○ 처리건수 : 연 50,000개정도(7,000㎏)

○ 사업기간 : 2005. 1월 ~ 12월

○ 폐기번호판 매각 : 연 10,000천원 세외수입 예상

○ 관련법령

- 회수번호판 폐기 : 자동차관리법 제10조 제6항

□ 추진실적

○ 관내 고철업체 선정 및 매각계약 체결 ---- 2005.1월

○ 회수 번호판 매각

- 실적(2005.10월 31현재) : 7,148천원 /5,585㎏

□ 이후계획

○ 회수 번호판의 철저한 폐기로 불법운행 방지 및

세외수입 증대

컨벤션복합시설건립팀 소관

ꊱ	전주 컨벤션복합시설 건립 ----------------	80
ꊲ	서신복합문화센터 건립 --------------------	81

전주 컨벤션복합시설 건립

□ 현  황

○ 위    치 : 전주시 덕진구 덕진동 1가 1220-1 외 (현, 전주종합경기장)

○ 부지면적 : 35,436평(수영장, 여성교육문화센터 3,400평제외)

○ 사업 내용

- 『사회기반시설에 대한 민간투자법』관련 대상 사업

- 기본시설 : 전시․컨벤션․호텔 등 복합시설

- 제안시설 : 사회기반시설에 관한 민간투자법상 가능한 모든 시설

○ 사업 추진방식 : BTO(건설 → 기부채납 → 운영)

□ 추진사항

○ 컨벤션센터 및 대체 체육시설건립 타당성 용역 간담회----  ’04. 8.17

○ 컨벤션복합시설지구 기본구상 정책연구 용역 ----- ’04.10～12월

○ 전주컨벤션복합시설추진 전문가 간담회 개최------ ’05. 2.25

○ 도시기본계획 변경 용역추진 -------------------- ’05. 3～12월

○ 민간투자자 사업설명회 및 투자의향 간담회 개최 --------- ’05. 4. 22

○ 전주종합경기장 토지분할 완료(‘05. 7월) 및 양여․양수 협의 중

- 종합경기장 대체시설 타당성 용역--------------- ’05. 5～12월

○ 전주컨벤션복합시설건립 추진계획 도에 제출 ----- ’05. 10.14

□ 이후계획

○ 컨벤션복합시설건립 사업설명회 ------------------ ’05.12월

○ 제안서접수 및 공공투자관리센터에 제안서 검토의뢰 ------- ’06. 1월

○ 제안내용 검토 및 공고 (90일 이상부여)----------- ’06. 4월

○ 제안서 검토․평가(사업계획평가단) --------------- ’06. 7월

○ 실시협약체결 및 사업시행자 지정(전주시⇔시행자)----- ’06. 9월

○ 사업자의 실시계획 신청 및 승인(전주시)---------- ’06.10월

서신복합문화센터건립

□ 현  황

○ 위    치 : 전주시 완산구 서신동 804, 804-1번지

○ 부지면적 : 2,016.6㎡(611평)

○ 건립규모 : 지하1층/지상5층,          연면적 : 1,900평

(주차장500, 동사무소150, 자치센터300, 건강증진센터50평, 도서관900평)

○ 사업기간 : 2005～2007(3개년)

○ 총사업비 : 80억원(국16, 도10, 특별교부세5, 시39, 청사정비기금10)

※ 2005년 예산 : 7억원(특별교부세5, 시비2)

□ 추진사항

○ 기본계획수립 --------------------------------- 2005. 5.13

○ 타당성조사 완료------------------------------- 2005. 9.15

○ 투․융자 심사(도심사)------------------------- 2005.10.13

○ 사업부서 변경--------------------------------- 2005.11. 1

(전통문화중심도시추진기획단 ⇒ 컨벤션복합시설건립추진팀)

□ 이후계획

○ 도시관리계획(세부용도)변경 ------------------ ’05.11～’06. 1월

○ 현상설계사업계획공고 ------------------------ ’05.11～’06. 1월

○ 도서제출 및 심사 ---------------------------- ’06. 2월

○ 실 시 설 계  -------------------------------- ’06. 3～6월

○ 행정절차이행(설계자문,감사실,건축허가협의 등) ------ ’06. 7월

○ 공사입찰공고 -------------------------------- ’06. 8월

○ 착        공 -------------------------------- ’06. 9월