제230회 전주시의회임시회

2006년도

주요업무보고

교통건설사업단

보  고  순  서

□	일 반 현 황		-----------	2
□	2006년도 시 책 방 향		-----------	9
□	2006년도 주요업무계획		-----------	10
	○	교 통 행 정 과	-----------	11
	○	도 로 과	-----------	18
	○	경 전 철 추 진 팀	-----------	36
	○	재 난 안 전 관 리 과	-----------	39
	○	차 량 등 록 사 업 소	-----------	53

일  반  현  황

□ 기구 ꠚꠚ  3과 1팀 1사업소 22담당(현원 106명)

															교통건설사업단
	교통행정과														도 로 과																경전철추진팀
주차장관리			운송사업지도				대중교통			교통정보관리				가로환경개선			도로재산관리			도로개설			도로유지관리			도로교통시설					경전철보상					경전철지원					경전철건설

				재난안전관리과																							차량등록사업소
	민방위				재 난 관리					복구지원				하천관리			하수도공기업			하수시설						총괄지원							등록							무보험차량조사						건설기계등록

□ 인    력

과 별		총 계	일 반 직						기능
			4급	5급	6급	7급	8급	9급
계	정 원	104	1	5	22	28	24	3	21
	현 원	106	1	5	22	44	9	2	23
교 통 행 정 과	정 원	26	1	1	4	7	5	1	7
	현 원	28	1	1	4	11	1	2	8
도 로 과	정 원	20		1	5	8	5		1
	현 원	20		1	5	11	2		1
경 전 철 추 진 팀	정 원	9		1	3	2	1	1	1
	현 원	9		1	3	3	1		1
재난안전 관 리 과	정 원	24		1	6	9	6	1	1
	현 원	23		1	6	12	3		1
차량등록 사 업 소	정 원	25		1	4	2	7		11
	현 원	26		1	4	7	2		12

□ 분장사무

과 별	분 장 사 무
교 통 행 정 과	○ 교통종합계획 수립 및 교통대책 추진 ○ 공영주차장 확충 및 관리 ○ 교통영향평가업무 ○ 자동차운송사업체 지도감독 ○ 대중교통(버스, 택시, 화물) 인‧면허 ○ 지능형 교통체계(ITS) 추진 및 운영관리
도 로 과	○ 도시가로망 확충사업 ○ 도로부지관리, 도로안내표지판 설치관리 ○ 자전거도로 시설, 가로등관리 ○ 가로환경 및 노점상 지도단속 ○ 도로교통 안전시설물 신설 및 유지관리
경 전 철 추 진 팀	○ 경전철 사업 추진 ○ 경전철관련 지장물 보상업무 ○ 공사관리 및 지도감독 ○ 전라선 복선화 사업
재난안전 관 리 과	○ 민방위 계획수립 및 추진 ○ 재난방재 종합계획수립 및 시행 ○ 하천 개수사업, 자연하천조성사업, 하천관리 ○ 하수도공기업 운영 ○ 하수관리 종합대책수립 및 시행 ○ 하수종말처리시설 운영관리
차량등록 사 업 소	○ 자동차 등록(전산입력, 자료관리 및 증명발급 등) ○ 자동차 및 건설기계 과태료부과 ○ 건설기계등록(전산입력, 증명발급,검사최고, 정비명령 등) ○ 무보험차량(손해보상보장법위반 과태료, 범칙금부과등)

□ 기본현황

○ 도    로

(단위 : 개소, ㎞)

구 분	계		고속국도		일반국도		지 방 도		시 도
	노선	연 장	노선	연 장	노선	연 장	노선	연 장	노선	연 장
총연장	850	407	1	5	5	62	3	22	841	318
포장도	850	407	1	5	5	62	3	22	841	318
포장율 (%)		100		100		100		100		100

※ 도로율 : 16.28%(도로면적/시가지면적)

○ 교량 및 기타 시설물

(단위 : 개)

구분 계	교 량					육교 보도	지하 보도	지하차도	터널	비 고
	소계	고속 국도	시의 국도	지방도	시도
122	103		34	3	66	6	6	5	2

※ 장대교량(삼례교 : 570m,  회포대교 : 707m)

○ 옥외광고물 현황

(단위 : 개)

광고업자 등록현황	시 지 정 광 고 시 설				비 고
	계	게시대	벽보판	기 타
430	515	150	365	-

○ 하  천

(단위 : ㎞)

구 분		개소	하천연장	제 방 연 장			개수율 (%)	비고
				계	기개수	미개수
계		32	132.8	202.2	182.4	19.8	90.2
법정하천	소 계	29	127.0	189.4	176.0	13.4	93.0
	국가하천	3	24.7	25.6	25.6	-	100.0
	지방 1급	2	18.2	37.5	36.0	1.5	96.0
	지방 2급	24	84.1	126.3	114.4	11.9	90.6
소 하 천		3	5.8	12.8	6.4	6.4	50.0

○ 하 수 도

구 분		처리구역 (㎢)	계획연장 (㎞)	시설연장 (㎞)	미시설연장 (㎞)	보급율 (%)	비고
계		53.1	2,317	1,321	996	57.0
합 류 식		18.9	653	653	0	100.0
분류식	소 계	34.2	1,664	668	996	40.1
	오수관거	-	920	435	485	47.2
	우수관거	-	744	233	511	31.3

○ 하수․위생처리 시설

구 분	하 수 처 리	위 생 처 리
위 치	덕진구 송천동 2가 1130번지
시설용량	1일 처리능력 ⇨ 403,000㎥ - 1단계 시설 : 103,000㎥ - 2단계 시설 : 200,000㎥ - 3단계 시설 : 100,000㎥	1일 처리능력 ⇨ 290㎘ - 분 뇨 : 30㎘ - 정 화 조 : 260㎘
처리방법	1․2단계 표준 활성 슬러지법 3단계 고도처리 공법	하수 연계처리 (1994년부터 시행)

○ 차집관로

하 천 명	연 장 (㎞)	맨 홀 (개)	우수토실 (개소)	환기구 (개소)	여수토실 (개소)
계 (5개노선)	71.8	887	208	68	5
전주천 (좌, 우안)	30.0	307	130	36	4
삼 천 (좌, 우안)	13.4	130	38	17
금암천 (좌, 우안)	2.9	97	23	10
아 중 선	11.4	174	13	4
팔복선(공장,생활)	10.8	132	2	1	1
상 관 라 인	3.3	47	2

○ 운수업체

(단위 : 개소/대)

구 분	계	버 스			택 시		화 물		렌트카	특수차	특수여객
		시내	시외	관광	회 사	개 인	회 사	개 인
업 체 수	161	5	5	19	25		71		23		13
보유대수	9,681	405	425	332	1,599	2,219	1,611	1,954	931	180	25

○ 자동차등록

(단위 : 대)

합 계	승 용 차	승 합 차	화 물 차	특 수 차
201,283	149,925	12,611	38,432	315

○ 주차장

계		노 상		노 외		부 설
개소	면수	개소	면수	개소	면수	개소	면수
9,775	134,904	68	3,319	375	13,903	9,332	116,872

※주차장확보율 : 66.6%

2006년도 시책방향

	안전하고 편리한 광역도시기반 구축
○ 사람중심의 편리한 대중교통체계 확립 ○ 전주 중심의 광역도로교통망 확충으로 지역발전 촉진 ○ 하천 생태계 복원을 통한 녹색환경도시 건설 ○ 재난․재해의 사전예방으로 안전한 전주이미지 제고

⇩

	중점추진방향
			ㅡ
		ㅣ
○ 시민이 이용하기 편리한 대중교통체계의 도입 ○ 도시 가로망 및 교통안전시설 지속적 확충 ○ 지역간 연계 교통망 확충으로 광역도시기반 구축 ○ 경전철 사업의 차질없는 추진으로 도시 교통난 완화 ○ 생태하천 조성으로 수질 개선 및 쾌적한 휴식공간 제공

2006년도

주요업무계획

교통행정과 소관

ꊱ	권역별 순환버스 및 무료환승제 도입 -------	12
ꊲ	택시 지역별 총량제 시행 -----------------	13
ꊳ	주차시설 확충 -------------------------	14
ꊴ	불법주정차 지도단속 효율성 제고 -----------	15
ꊵ	어린이 교통안전 체험관 운영 --------------	16
ꊶ	교통신호시스템 효율적 운영관리 -----------	17

권역별 순환버스 및 무료환승제 도입

	추 진 배 경
○ 수요자 중심의 노선조정으로 시내버스 만족도 및 이용율 제고 ○ 교통소통 개선, 수송효율 제공 등 버스 운행관리의 효율화

□ 사업개요

○ 시내버스 무료환승제

- 대상 : 시내권역에 모든 시내버스 1회 무료 환승

- 방법 : 버스 하차시 교통카드를 단말기에 입력한후 30분이내 환승

○ 권역별 순환버스 운영

- 운행노선 : 4개 권역별 환승 네트위크 구성

- 운행대수 : 36대정도, 15～20분 간격 운행

○ 사 업 비

- 환승시설 설치 및 홍보 : 420백만원

□ 그간 추진상황

○ 시내버스 환승체계 도입 및 노선조정 용역 --- 2005. 9～2005. 12

○ 무료환승 및 순환노선제 지역설명회(18개지역) -- 2006. 1월

□ 2006년도 추진계획

○ 환승체계 시행 준비 --- 2006. 1～2006. 2

- 하차단말기 설치, BIS프로그램 변경, 노선도 등 제작

○ 순환노선 확정 및 무료환승 시민홍보 --- 2006. 1～2006. 2

○ 순환노선 시험운영 ----------- 2006. 2월

○ 환승체계 본격시행 ----------- 2006. 3월중

택시 지역별 총량제 시행

	추 진 배 경
○ 지역별 택시이용 수요에 부합하는 적정 공급량을 합리적으로 산정하여 택시 산업의 건전한 발전 도모 ○ 근 거 - 여객자동차운수사업법 제6조 1항 - 택시제도운영기준에 관한 업무처리 요령(건교부훈령 371호)

□ 택시 공급현황

구 분	인 구	택 시 대 수			인구 1,000명당 대 수
		계	법 인	개 인
전 주 시	625,113	3,818	1,599	2,219	6.11대

○ 인구 천명당 수원4.24, 안양4.41, 청주6.07, 창원2.85, 포항5.32

□ 그간 추진상황

○ 택시 지역별총량제 시행방안 시달 -------- 2004. 12

- 2004. 7. 5일 신규면허 일시중지 조치

○ 택시 이해당사자, 관계전문가 등 시행방안 협의 --- 2005.09～10

○ 택시 총량 산정 및 중장기 공급계획 용역 --- 2005.11～2006. 2

□ 2006년도 추진계획

○ 전주시 택시심사위원회 심의 -------- 2006. 3월

○ 총량제 시행계획 전라북도 협의 ----- 2006. 3월

○ 2005년도분 개인택시 신규면허 공급 ---- 2006.4 ～ 6월

주 차 시 설  확 충

	추 진 배 경
○ 주차공간의 지속적 확충으로 주차난의 근원적 해소 ○ 시민 주차의식 전환으로 선진주차문화 정착

□ 사업개요

○ 도심공영주차장 조성 : 1개소  150면  2,000백만원

○ 카풀주차장 조성    :  2개소 160면   800백만원

○ 녹색주차마을(그린파킹) 조성 : 2개소 4,000백만원

□ 그간 추진상황

○ 주차수급 실태조사 용역 -------- 2005.10～ 2006. 5

○ 남원방면 카풀주차장 부지(3,234㎡) 매입 -- 2005. 12

○ 그린파킹 실시설계 용역--------- 2005.10～2006. 2

○ 그린파킹 시범지역 (2개소) 선정 -- 2006. 1

□ 2006년도 추진계획

○ 도심공영 주차장 조성 : 1개소 150면 (’06예산 : 500백만원 확보)

- 대상지 선정 및 부지매입 ---------- 2006. 6월

- 설계 및 착공 -------------------- 2006. 7 ～ 8월

○ 카풀주차장 조성 : 2개소 160면 800백만원

- 임실, 남원방면 설계 및 착공 ------- 2006. 2 ～ 3월

- 진안, 장수방면 부지매입, 설계, 착공-- 2006. 7～ 8월

○ 그린파킹 조성

- 시범지역 2개소 사업 착수 :  2006. 5 ～ 2007. 8월

※ 2006년도 소요사업비 2,000백만원 추경예산 확보

불법주정차 지도단속 효율성 제고

	추 진 배 경
○ 상습 불법 주정차로 인한 교통정체구간 소통 개선 ○ 선진 교통문화 및 주차질서 정립을 위한 시민의식 전환

□ 주차단속반 운영 현황

○ 단속구간 : 318개 구간 215km

○ 단속인력 : 99명(완산 54, 덕진 45)

○ 단속반 운영 : 27개조(주간 16, 아침‧야간 5, 휴무일 6)

□ 사업개요

○ 교통서포터즈 운영(주차질서 계도) ---- 50명,  100백만원

○ PDA를 활용한 단속으로 효율성 제고 --- 28대     59백만원

○ 불법주정차 무인단속시스템 확대 구축 - 20개소 600백만원

□ 그간 추진상황

○ 불법주정차 무인단속시스템 설치 운영 --- 9개소

- 무인단속실적(’05. 5～’05. 12월말) --- 11,608건

※ 대당 1개 단속조(단속차량 1대, 3명)보다 16% 증가 효과

□ 2006년도 추진계획

○ 교통서포터즈 운영(주차질서 계도) -- 2006. 3～11월

○ PDA 단말기 및 프로그램 구입 ----- 2006. 2～3월

○ 불법주정차 무인단속시스템 확대 구축

- 설치장소 선정 및 의견수렴 --- 2006. 2～6월

- 불법부정차 단속장비 설치 ---- 2006. 7～9월

어린이 교통안전 체험관 운영

	추 진 배 경
○ 단순한 관람위주의 전시관 개념을 넘어 어린이들이 보고, 이해하고, 느끼는 체험을 통해 즐기면서 교통법규 준수의 중요성을 인식할 수 있는 교통체험관 구축 운영

□ 사업개요

○ 위    치 : 교통정보센터 (금암동)

○ 규    모 : 133.1평 ( 5층 56.8평  옥상층 76.3평)

○ 이용대상 : 유치원생, 초등학교 저학년생

○ 체험내용

- 실내체험관 : 드라이빙 시뮬레이터, 3D입체영상관, 교통종합 모형

- 실외실습장 : 교통신호등 체험, 도로안전 표지판, 소화기 분사 실습

- 옥상전망대 : 주요 도로상 교통상황, 휴식용 벤치 비치 등

○ 소요예산 :10,000천원(홍보물 제작)

□ 그간 추진상황

○ 교통안전체험관 (5층, 옥상층) 시설 완료 --- 2005. 7～2005. 12

- 엘리베이터 시설 : 2006. 2월초 준공 예정

○ 교육프로그램 관련 타시 벤치마킹 ----- 2005.12～2006. 1

□ 2006년도 추진계획

○ 교통안전 체험관 운영 전문인력 확보 -- 2006. 2월

- 홍보도우미 활용 (대학연수생/노동청 협조)

○ 시민홍보(홈페이지,,유치원,어린이집,초등학교 등) -- 2006. 2~2006. 3월

○ 교통안전 체험관 개관 ---- 2006. 3월

교통신호시스템 효율적 운영 관리

	추 진 배 경
○ 교통정보센터 시설물의 급속한 증가 및 장비 노후화로 수시로 시스템에 장애발생(체계적이고 효율적인 유지관리 필요) ○ 초기 최적의 신호운영시스템을 구축해 놓고도 이를 효율적으로 운용 관리할 수 있는 체계미흡(신호연동화 DB구축 필요)

□ 사업개요

○ 교통신호시스템 유지관리 : 200백만원

- 시스템메인장치, 교통상황판, 전용회선, 신호제어기 400개 등

○ ITS 시설물 유지관리 : 50백만원

- CCTV 39개소, 교통안내전광판 19개소, 차량검지제어기 40개소

○ 버스정보시스템(BIS) 유지관리 : 80백만원

- 버스안내시스템 134개소, 노변기지국 233개소, 차량단말기 410개

○ 교통정체지역 소통개선 및 신호연동화 개선 : 150백만원

- 교통량조사, 현시방법 및 현시 값 조정, 주기조정, 연동 값 조정

- 각종 교통신호체계 기술운영 및 DB 구축

□ 그간 추진상황

○ 신호운영체계 통합 및 연동화사업 ---- 2004. 12～2006. 1

- 시내간선도로 여행속도 평균 10(Km/h)향상 (26.2→36.2)

- 여행시간 단축(24분 18초 → 18분 56초)

○ 시설물 유지관리에 따른 전문가 의견수렴 --- 2005. 12

□ 2006년도 추진계획

○ 유지관리 계획수립 및 용역발주 ------------- 2006. 2

○ ITS, 버스안내시스템 유지보수 단가계약 체결--- 2006. 2

도 로 과  소 관

ꊱ	남부순환도로 개설 ------------------------	19
ꊲ	전주진입로 확장 --------------------------	20
ꊳ	대학로 개설관련 전북대시설 지원사업 -------	21
ꊴ	동산고가교 접속도로 확장 -----------------	22
ꊵ	원대한방병원~가련교간 도로개설 ----------	23
ꊶ	한옥마을 테마관광로(은행로)조성 ----------	24
ꊷ	덕진동 법원~동아한일APT간 도로개설 -----	25
ꊸ	세내길(우림교~포스코 간) 도로개설 --------	26
ꊹ	어린이보호구역 개선사업 ------------------	27
	중앙분리대(화단) 설치 --------------------	28
	래저용 자전거도로 확충 -----------------	29
	교통사고 예방을 위한 교통안전시설물 확충 및 정비 ---	30
	서남권 국도대체 우회도로 건설 -------------	31
	북부권 국도대체 우회도로 건설 -------------	32
	전주~논산간 고속도로 확장 ----------------	33
	전주~광양간 고속도로 건설 ----------------	34
	익산~전주~장수간 고속도로 건설 ----------	35

남 부 순 환 도 로  개 설

	추 진 배 경
○ 서남권 지역의 교통량을 외곽으로 분산시켜 도심교통난 해소 ○ 외곽 도로망 구축으로 주변의 발전 기틀 및 교통편익 제공

□ 사업개요

○ 구    간 : 동서학동 좁은목～서서학동 장승로

○ 사 업 량 : 연장 1,560m,  폭 25～35m

○ 사 업 비 : 36,800백만원 (보상 21,600. 공사 15,200)

○ 사업기간 : 1998 ～ 2007(10개년)

□ 그간 추진상황(전체공정 50%, 투자액 16,557백만원)

○ 공수교～거산황궁ⓐ～무궁화주유소간 공사완료 --  1998～2005. 9

○ 교대뒤 위험건물 우선보상 완료(24동) -- 2005. 3～2005. 12

□ 2006년도 추진계획 ------ 2,000백만원 확보

○ 동절기로 중지된 공수교 부근(150m) 공사마무리 - 2006. 3월

○ 교육대뒤 지장물(26동) 및 이주비 보상---- 2006. 2～6월

○ 시점부 도로포장 및 산성천 BOX 설치---- 2006. 3～4월

○ 거산황궁ⓐ～산성천간 지장물 철거 및 폐기물 처리-- 2006. 5～10월

전 주 진 입 로  확 장

	추 진 배 경
○ 우리시 관문인 전주진입로 확장으로 쾌적한 도시환경 제공 ○ 미확장 구간 도로확장으로 병목현상 및 교통체증 해소

□ 사업개요

○ 구    간 : 원대한방병원～팔복동 BYC(시의시도)

○ 사 업 량 : 연장 1,320m,  폭 35⇒50m

○ 사 업 비 : 17,000백만원 (보상 10,000. 공사 7,000)

○ 사업기간 : 1999 ～ 2006(7개년)

□ 그간 추진상황(전체공정 56% 투자액 9,486백만원)

○ 원대한방병원～추천대교간 확장개통(710m) --- 2003. 12

○ 추천대교～동화약품(편측 205m) 확장완료 --- 2005. 9

○ 동화약품～BYC구간 보상완료 ----------- 2005. 7～10

□ 2006년도 추진계획 ----- 2,500백만원 확보

○ 동화약품～BYC(서쪽 405m)분할 및 감정평가 --- 2006. 1～ 2

○ 추천대교～BYC(서측 405m)보상 및 공사완료 --- 2007. 3～11

대학로개설 관련 전북대시설 지원사업

	추 진 배 경
○ 도시가로망 확충을 위한 대학로개설내 국유지 대체시설지원 ○ 국유지사용 대체시설 협약체결사업으로 행정 신뢰성 제고

□ 사업개요

○ 구    간 : 전북대학교내

○ 사 업 량 : 대운동장 보수 1식, 학군단층축 106평,

동물병원후면 배수Box L=30m(3x2x2련)

○ 사 업 비 : 2,069백만원(21필지 31,470㎡)

○ 사업기간 : 2004～2006(3개년)

□ 그간 추진상황(전체공정 50%, 투자액 1,040백만원)

○ 대학로내 국유지사용 대체시설 협약체결 -- 2003.12.22

○ 학군단 방음벽시설 완료(140백만원)  ------ 2004.12.20

○ 대운동장등 보수공사착수(900백만원)------- 2005.10.27

□ 2006년도 추진계획----- 300백만원 확보

○ 대운동장 보수(3,743㎡) 완료 ------------- 2006. 2～6월

○ 학군단 증축(350㎡) 및 배수BOX(130m) 설치--- 2006. 6～11월

□ 문제점 및 대책

○ 대학로내 국유지사용 대체시설 협약이행 사업으로 부족사업비

729백만원을 ’06년 추경에 확보 추진

동산고가교 접속도로 확장

	추 진 배 경
○ 동산고가교 접속도로 진,출입부 미확장으로 병목현상 초래 ○ 도로확장으로 교통사고 위험해소는 물론 차량 소통 원활 기여

□ 사업개요

○ 구    간 : 동산고가교～동산역(시의시도)

○ 사 업 량 : 연장  340m,   폭 18.5 ⇒ 35m

○ 사 업 비 : 2,990백만원 (보상 1,700. 공사 1,290)

○ 사업기간 : 2003 ～ 2006(4개년)

□ 그간 추진상황(전체공정 28%, 투자액 840백만원)

○ 용지매입(10필지 779㎡/200백만원) ------  2004. 12

○ 상행선(반폭) 확장공사 완료(640백만원) --- 2005. 3～5

□ 2006년도 추진계획----- 300백만원 확보

○ 3차공사 시행 ------------------------- 2006. 3～4월

- 농업용수로 복개(L=20m)및 상ㆍ하수도 설치(L=538m)

- 하행선 도로확장 및 인도설치 L=100m

○ 농수로 잔여분(L=80m) 복개 ------------ 2006. 10～12

□ 문제점 및 대책

○ 대형차량의 급증 및 과속등으로 사고위험이 많은 구간임으로

부족사업비 1,850백만원 ’06년 추경에 확보 공사 마무리

원대한방병원～가련교간 도로개설

	추 진 배 경
○ 하가택지개발사업 시행으로 도로기반시설 확충 절대 필요 ○ 북부권과 서남권을 연결하는 주요도로 개설로 교통난 해소

□ 사업개요

○ 구    간 : 원대한방병원～가련교간(시의 시도)

○ 사 업 량 : 연장 1,250m,  폭 35m

○ 사 업 비 : 27,000백만원  (보상 10,000, 공사 17,000)

○ 사업기간 : 2005 ～ 2008(4개년)

□ 그간 추진상황(전체공정 3.9%  투자액 1,060백만원)

○ 실시설계완료 및 도시계획 변경결정(광장축소) --- 2003.11～2005. 8

○ 편입토지 보상(5필지/3,948㎡) ------- 2005. 8～12

□ 2006년도 추진계획----- 1,000백만원 확보

○ 실시설계 보완 및 공사 총괄발주 --- 2006. 2～ 3월

○ 택지개발 사업지구내 도로 우선시행(300m)--2006. 4～12월

□ 문제점 및 대책

○ 택지개발사업 공정계획에 맞추어 사업추진을 위해서는

’06년 부족예산 9,000백만원 추경에 확보

년 도 별	2006년	2007년	2008년	비 고
소요예산(백만원)	10,000	14,000	2,000

한옥마을테마관광로(은행로)조성

	추 진 배 경
○ 한옥마을을 찾는 국내외 관광객들의 안전한 보행권 확보 ○ 가장 한국적인 전통문화 이미지를 반영 관광명소로 부각

□ 사업개요

○ 구    간 : 남천교～동부시장(시의시도)

○ 사 업 량 : 연장 980m,  폭 8 ⇒ 12m

○ 사 업 비 : 9,500백만원(보상4,500  공사5,000)

- 실시설계결과 공사비 3,000백만원 증가

○ 사업기간 : 2005～2006(2개년)

□ 그간 추진상황(전체공정 33.8%,투자액 2,200백만원)

○ 도시계획변경결정(폭15⇒12m) ----------2005. 8

○ 분할측량 및 보상추진(L=400m/2,000백만원) --- 2005. 9～12

○ 실시설계 주민설명 및 의견수렴(양방통행) --2006. 1. 11

□ 2006년도 추진계획-- 4,200백만원 확보(국비2,700 시비1,500)

○ 잔여구간 보상추진(태조로～동부시장) --- 2006. 3～6

○ 공사시행  ------------------------- 2006. 3～12

□ 문제점 및 대책

○ 국비 지원사업이며 테마관광로와 동시 완료하여 관광효과를 극대화

하기 위하여 부족사업비 3,100백만원을 ’06년 추경예산에 확보

덕진동 법원～동아한일APT간 도로개설

	추 진 배 경
○ 교량가설 완공으로 서신ㆍ덕진동 일대 교통혼잡 해소 ○ 신시가지와 구도심지역을 연계한 도로개설로 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 구    간 : 덕진동 법원～서신동 동아한일APT

○ 사 업 량 : 연장 248m, 폭 25m(교량 118m, 도로 130m)

○ 사 업 비 : 11,000백만원(보상 3,000  교량부분7,200  도로부분800)

○ 사업기간 : 2004 ～ 2006(3개년)

□ 그간 추진상황(전체공정 63.6%,투자액(민자) 7,000백만원)

○ 롯데백화점 입점에 따른 도로개설 협약체결 --- 2004. 5

○ 도시계획사업실시계획인가(롯데쇼핑 시행)  --- 2005. 1

○ 교량가설 공사중(현공정 80%) ---------  2005. 3～현재

□ 2006년도 추진계획----- 3,000백만원 확보

○ 사업기간 연장 및 보상비부담 변경협약 --2006. 2

○ 도시계획시설 변경(도로선형) ------- 2006. 2

○ 용지보상 및 공사 추진 ------------ 2006. 3～8

세네길(우림교～포스코간)도로개설

	추 진 배 경
○ 대단위 신축아파트 밀집지역의 진출입로 미개설로 교통체증 심각 - 아파트 1,527세대가 2005. 9월부터 입주 시작 ○ 서부신시가지와 연계되는 주요 노선으로 도로개설이 시급함

□ 사업개요

○ 구    간 : 효자동 우림교～포스코간(시의 시도)

○ 사 업 량 : 연장 350m,  폭 25m

○ 사 업 비 : 4,700백만원(보상 1,600, 공사 3,100)

○ 사업기간 : 2006～2007(2개년)

□ 2006년도 추진계획----- 500백만원 확보

○ 분할측량 및 실시설계용역 발주 --------- 2006. 1～ 2

○ 지장물 조사 및 실시계획 인가 ---------- 2006. 2～ 5

○ 지장물 감정평가 및 보상협의 ----------- 2006. 3～12

어린이보호구역 개선사업

	추 진 배 경
○ 교통약자인 어린이를 안전사고로부터 보호하기 위한 통학로 교통안전시설 확충 및 정비

□ 사업 개요

○ 사업기간 : 2003 ～ 2006(목표년도)

○ 총사업량 : 중앙초교 외 58개교

○ 총사업비 : 8,871백만원(국비50%, 시비50%)

□ 그간 추진상황

○ 투자사업비 : 4,681백만원(국비 50%.  시비 50%)

구 분	계	2003년	2004년	2005년
사업량	30	6	9	15
사업비	4,681	1,461	1,020	2,200

□ 2006년도 추진계획----- 2,579백만원 확보

○ 사업량 : 금암초교 외 26개교  3,958백만원 소요

○ 조사 및 측량 ------ 2006. 2월

○ 관할경찰서 협의 및 지역주민,학부모 의견수렴--- 2006. 3월

○ 공사발주 시행 ------ 2006. 4 ～ 12월

□ 문제점 및 대책

○ 국비 보조내시분 시비부담금 미 확보 : 1,379백만원

(2005년도 : 1,200백만원,  2006년도 : 179백만원)

○ 1회 추경예산에 전액 확보하여 당해연도에 사업완료

중앙 분리대(화단) 설치

	추 진 배 경
○ 중앙선 침범과 무단횡단으로 인한 교통사고를 사전에 방지하고 안전한 차량 통행으로 녹색 환경도시 건설

□ 사업개요

○ 대    상 : 교통사고가 잦은 주요간선도로(4차선도로)

○ 사 업 량 : 49개노선  68.9km

○ 사 업 비 : 15,000백만원(국비 7,500,  시비 7,500)

○ 사업기간 : 2002 ~ 2011(10개년)

□ 그간 추진상황

○ 중앙분리대 정비계획 수립 : 2003. 6

○ 사 업 량 : 11개노선 20.0km

- 화단형 11.7   - 방호형 4.0   - 수벽 4.3

○ 사 업 비 : 6,525백만원(국 3,041  시 3,484)

□ 2006년도 추진계획 --- 444백만원 확보(국 221, 시 223)

○ 사 업 량 : L=2.4㎞(월드컵로 서곡광장～호남제일문)

- 한전 지중화사업과 병행 추진

○ 사업시행 : 2006. 4 ～ 12월

- 경계석 설치 및 화단 성토를 우선 추진하고

부족예산 448백만원을 추경에 확보하여 조경 식재

레저용자전거도로 확충

	추 진 배 경
○ 주 5일 근무에 따른 시민의 레저 및 여가활동이 늘어남에 따라 자전거 이용자의 증가가 예상되어 레저 및 출∙퇴근용 자전거 도로 확충

□ 사업개요

○ 위    치 : 하천제방도로(삼천, 전주천) 및 완주공단진입로

○ 사 업 량 : 자전거도로 시설 13.5㎞

○ 사 업 비 : 3,024백만원

□ 그간 추진상황 : 2,734백만원(국비 1,493 도비 250 시비 991)

○ 동서학동(전주천) 바람쐬는길 자전거도로 6.0km    800백만원

○ 완주공단 진입로 자전거도로(송천육교～회포대교) 3.5km 1,934백만원

□ 2006년도 추진계획

○ 사 업 량

- 삼천교상류 우안제방도로  4km중  1.0km  120백만원

- 완주공단 진입로 마무리(안전시설) 1.2km  170백만원

○ 사 업 비 : 290백만원 (분권 145 도비 100 시비 45)

※ 완주공단 진입로 회포대교부근 잔여구간 290m는

국토대체우회도로 중복구간으로 익산청에서  추진

교통사고 예방을 위한 안전시설물 확충 및 정비

	추 진 배 경
○ 교통사고 줄이기 목표 조기 달성 - 자동차 1만대당 사망자 4.5인 ⇒ 2.0인(계획년도 2006년도) - 자동차보험 지급율 및 손해율 전국의 80%이하 수준으로 개선

□  사업개요(2006년도)

○ 사업내용

- 교통안전시설 정비 및 차선도색 외 5개사업 --- 1,450백만원

- 사고잦은지점 불합리한 교차로 구조개선 1개소 -----  200백만원

- LED신호등 설치. 45개 교차로 -------------  500백만원

- 위치부적정 신호등 이설 및 가로 안전시설물 집약화 - -  600백만원

○ 사업비 : 2,750백만원 (국 500, 시 2,250)

□ 그간 추진상황(2005년도 사업)

○ 교통안전시설 확충․정비(6개사업 1,525백만원) : 완료

○ LED 신호등 교체설치사업(40개교차로 416백만원) : 완료

○ 교통사고 잦은 곳 구조개선사업(1개소 50백만원) : 2006. 2월말 완공

○ 위치 부적정 신호등 이설 및 안전시설물 집약화(600백만원) : 완료

□ 2006년도 추진계획

○ 설계 및 발주 ---- 2006. 1～ 3월

○ 공 사  시 행 ---- 2006. 3～2007. 1월

※ 단가계약으로 공사추진 : 민원 요구사항 및 불편지역 신속대처

서남권 국도대체우회도로 건설

〈계속 ․ 국가사업〉

	추 진 배 경
○ 시가지를 통과하는 국도1호, 17호, 27호선과 지방도 712호, 716호, 749호선의 교통량을 분산하여 시내권 교통정체 해소 ○ 서남부지역 원활한 물동량 이동의 중심기능을 강화함으로써 지역개발 촉진 및 광역도시 발전기반 구축

□ 사업개요

○ 구    간 : 완주군 상관 ～ 구이 ～ 이서 ～ 용정 ～ 익산시 춘포

- 완공계획 : 구이～용정(2006년),  용정～춘포(2010년)

○ 사업규모 : 33.4㎞ (폭 20m) ※ 전주시 구간 13.4km

○ 사 업 비 : 4,574억원(국비 4,296 . 시비 278)

○ 사업기간 : 1998 ～ 2010년(13년)

○ 시 행 청 : 익산지방국토관리청(보상 : 전주시)

□ 그간 추진상황 ---- 3,475억원(국비 3,260.  시비 215)

○ 상관∼구이간(L=8.9㎞) 개통 ------ 2005. 4. 20

○ 총 공 정 : 77%(공사 69%.  보상 85%)

- 보상실적 : 764필지 229,057평(215억원)

□ 2006년도 추진계획---- 120억원(국비 95. 시비 25)확보

○ 2개공구 보상추진 : 156필지 281,829㎡(85,402평)

- 이서～용정 :  41필지  37,137㎡(11,253평)

- 용정～춘포 : 115필지  244,692㎡(74,149평)

북부권 국도대체우회도로 건설

〈계속 ․ 국가사업〉

	추 진 배 경
○ 시가지를 통과하는 국도17호, 27호선 교통량을 분산하여 시내권 교통정체 해소 ○ 북동부지역 원활한 물동량 이동의 중심기능을 강화함으로써 지역개발 촉진 및 광역도시 발전기반 구축

□ 사업개요

○ 사업구간 : 조촌 용정∼아중역(1단계)∼동서학동 색장리(2단계)

- 1단계 : 2003 ∼ 2011년(9년)

- 2단계 : 2020년까지(전주~광양간고속도로 교통수요 예측 후 개설)

○ 사업규모 : L = 18.6km,  B = 20m(전주시구간 : 11.77㎞)

○ 사 업 비 : 3,040억원 (국비 2,790 . 시비 250)

○ 사업기간 : 2003년 ～ 2011년 (9개년)

○ 시 행 청 : 익산지방국토관리청(보상 : 전주시)

□ 그간 추진상황

○ 기본․실시설계 및 교통영향평가 완료 --- 2003. 7 ～2005. 11

- 기본․실시설계 : 1단계 구간(용정∼아중역)

○ 1단계 구간중 1공구(용정～용진) 전라북도 교통영향평가 완료

※ 용진∼색장리간 노선 재결정(전라북도 교통영향평가심의위원회 심의안)

○ 1공구(용정～용진) 대안입찰 발주 --- 2005. 12. 22

□ 2006년도 추진계획 ---- 30억원(국비) 확보

○ 공사발주 및 착공(용정∼용진, L=11.3㎞) --- 2006. 6월말

○ 편입용지 보상추진

전주∼논산간 고속도로 확장

〈계속 ․ 국가사업〉

	추 진 배 경
○ 천안∼논산간 고속도로 개통에 따른 교통정체 해소 ○ 논산∼전주간, 전주∼광양간, 익산∼장수간 고속도로 연결로 물류비용 절감 ○ 행정수도 연계 교통망 구축으로 지역균형발전의 활성화 도모

□ 사업개요

○ 구    간 : 삼례 ∼ 논산간

○ 사업규모 : 연장 17.0km, 폭 4차로 ⇒ 6∼8차로

○ 사 업 비 : 3,500억원 (국비)

○ 사업기간 : 2002 ∼ 2008 (7개년)

○ 시행기관 : 건설교통부(한국도로공사)

□ 그간 추진상황

○ 기본 및 실시설계 완료 (66억원)---- 2002. 8∼2004. 10

○ 공사발주 및 착공 ----- 2005. 12. 27

※ 우선 삼례∼논산간 구간 발주, 전주∼삼례간은 현재 추진중인

익산∼장수간, 전주∼광양간 고속도로 개통후 통행량 추이를

검토하여 시행여부 결정

□ 2006년도 추진계획 ---- 200억원 확보

○ 편입용지 보상 및 공사추진

전주∼광양간 고속도로 건설

〈계속 ․ 국가사업〉

	추 진 배 경
○ 군장산업단지와 광양만 산업단지의 연결도로망 구축시급 ○ 호남고속도로 및 익산∼장수간 고속도로의 연결로 고속도로 이용율 제고 및 산업경쟁력 증진

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주 ∼ 광양간

○ 사업규모 : 연장 117.8km (전북구간 72.7Km, 전주시 구간 7.78㎞)

○ 사 업 비 : 28,231억원 (국비)

○ 사업기간 : 2003 ∼ 2011 (8개년)

○ 시 행 청 : 건설교통부(한국도로공사)

□ 그간 추진상황

○ 기본 및 실시설계․환경영향평가 등 행정절차 완료 : 2003. 12

○ 도로구역결정고시 : 2004. 09

○ 전주～임실구간(37.89㎞) 공사착공 : 2004. 12. 30

○ 7-8공구(임실∼광양) 착공 : 2005. 3. 31

□ 2006년도 추진계획 --- 국비 1,660억원 확보

○ 편입용지 보상 및 도로 축조공사

□ 문제점 및 대책

○ 우아동 삼거마을 주민민원 발생

- 성토로 계획된 구간 L=460m를 고가교로 시설 요구

○ 총 사업비 범위내에서 최대한 주민의견 수렴계획(도로공사)

익산∼전주∼장수간 고속도로 건설

〈계속 ․ 국가사업〉

	추 진 배 경
○ 군․장 산업단지 등 서해안 공업지대와 동남해안 공업지대를 연결하는 도로망 구축으로 물류비용 절감

□ 사업개요

○ 위    치 : 익산 ∼ 전주 ∼ 장수간

○ 사업규모 : 연장 61km 폭 4차로

○ 사 업 비 : 11,347억원 (국비)

○ 사업기간 : 2001 ∼ 2008 (8개년)

○ 시 행 청 : 건설교통부(한국도로공사)

□ 그간 추진상황 --- 6,900억원(국비) 투자

○ 용지보상 추진 (보상율 98%)

○ 도로축조 및 구조물 시공 (공정율 50%)

○ 건축공사 등 기타공사 시행중

□ 2006년도 추진계획 --- 국비 1,200억원 확보

○ 편입용지 보상 및 도로축조공사 추진

※ 준공예정 : 2007. 12월말 (계획년도 보다 1년정도 조기준공)

경전철추진팀 소관

ꊱ	경전철 건설로 대중교통 써비스 향상 ---------	37
ꊲ	전라선복선 전철화사업 -----------------	38

경전철 건설로 대중교통 써비스 향상

	추 진 배 경
○ 급격한 자동차의 증가와 도로시설 공급의 한계로 인한 도심 교통난을 해소하고, ○ 교통약자 중심이고 친환경적이며 사람중심의 광역교통 체계로 전환

□ 사업개요

○ 시스템 및 노선연장 : 노면전차(Tram) 24.0㎞

- 1단계 : 송천역～한방병원～팔달로～평화광장～삼천농협공판장(14.3㎞)

- 2단계 : 전주역～백제로～곰솔나무길～평화광장～평화 3지구(9.7㎞)

○ 사 업 비 : 5,050억원(국비20%, 지방비20%, 민자60%)

○ 사업기간 : 2001～2013(13년간)

□ 그간 추진상황

○ 전주경전철 기본설계용역 계약(동명기술공단)  --- 2004.12.09

○ 도시철도기본계획 승인(건설교통부) -------- 2005.10.14

○ 민자사업지정 사업계획 검토 및 시설사업기본계획(안)자문의뢰

(KDI 부설 공공투자관리센타) ------------ 2005.12.15

□ 2006년 계획

○ 전주경전철 기본설계 용역 준공 ---------- 2006. 2

○ 민자사업 지정 및 기본계획(안) 승인 신청 --- 2006. 3

○ 민간투자사업계획서 접수․평가 및 협상대상자 선정 --- 2006. 7～10

○ 민간투자 협상실시 및 협약체결 ------- 2006.11～2007. 7

□ 2007년 이후계획

○ 실시계획 수립 ------------------- 2007.08～2008. 1

○ 실시설계 승인 및 1단계 사업착공 ---- 2008. 4

○ 1단계 사업완공 및 2단계 사업 착공 --- 2011. 1

○ 2단계 사업완공 ------------------- 2013. 6

전라선복선 전철화사업

〈계속 ․ 국가사업〉

	추 진 배 경
○ 호남선･전라선 연계 교통망 확보 및 쾌적.신속한 수송서비스로 이용객 편의 도모 ○ 남해안 중공업지대(광양,여천)의 화물 신속 운송으로 국가 경쟁력강화

□ 사업개요

○ 사업구간 : 전라선 익산～전주～신리～순천

○ 사업규모 : L=154km, 사업비 1조1,678억원

- 전라선 전철화구간(신리～순천) : 118.8km, 3,738억원 - 국가사업

- 복선전철화구간 (익산～신리) :  35.2km, 7,940억원 - BTL사업

○ 사업기간 : 2002 ～ 2010 (9개년)

○ 시행기관 : 건설교통부 (한국철도시설공단)

□ 그간 추진상황 ---- 1,323억원(국비)

○ 전라선 전철화사업 착공(신리～순천) -------- 2005. 8

- 전차선로, 전철 전원설비, 전력설비(현공정 : 10%)

※ 단선공사(익산～신리)⇒복선공사로 변경(2005년 감사원지적)

○ 전라선 복선전철화(익산～신리) 기본설계 ---- 2004. 8～2005.12

- 도심통과구간(메가월드~진흥W-파크) 반지하화 반영

- 환경,교통영향평가 착수 ------------ 2005. 8

□ 2006년 추진계획 ----- 550억원(국비)

○ BTL사업구간(익산～신리) 추진

- 환경,교통영향평가 -------------- 2005. 8～2006. 9

- BTL사업 기본계획 고시 --------  2006년 상반기

- 민간업체 선정 및 공사 ---------- 2006～2010

○ 전라선 KTX 운행 : 2011년 상반기

재난안전관리과 소관

ꊱ	삼천 자연형하천 조성사업 -----------------------	40
ꊲ	전주천 자연형하천 정화사업 ---------------------	41
ꊳ	만경강 생태하천 가꾸기사업 ------------------------	42
ꊴ	아중천 생태하천조성 및 준설사업 ----------------	43
ꊵ	덕진보 상류 수질오염 방지사업 ---------------------	44
ꊶ	지방2급 하천정비기본계획 수립 -----------------	45
ꊷ	만경강수계치수 중복천개수공사---------------------	46
ꊸ	하수처리장 기존 1,2단계 고도처리사업-----------	47
ꊹ	화산․덕진처리구역 하수관거 정비사업 ------------	48
	하수종말처리 차집관거 시설사업 -----------------	49
	하수관거정비(BTL)민간투자사업----------------	50
	하수처리장 민간위탁관리 -----------------------	51
	2005. 8. 2 ~ 8. 3 수해복구사업 ---------------	52

삼천 자연형하천 조성사업

	추 진 배 경
○ 서부지역의 급속한 도시발전으로 삼천이용객이 급증함에 따라 수질개선과 하천생태계 복원 및 각종 편익시설 확대 설치가 요구됨

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 삼천동 삼천교 ～ 팔복동 추천대교

○ 사업규모 : L= 8.05㎞

○ 총사업비 : 12,188백만원

○ 사업기간 : 2001 ～ 2006 (6개년)

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	2004까지	2005년도	2006년도
계	12,188	8,229	2,400	1,559
국 비	7,553	5,029	1,165	1,359
시 비	4,635	3,200	1,235	200

□ 그간 추진상황

○ 기본 및 실시설계 -------------------  2001. 10. 15

○ 공 사 ----------------------------- 2001. 12. 31

○ 총 공정 대비 82% 완료 --------------  2005. 12. 30

※ 자연형 호안 3.5㎞, 차집관로 1,6㎞, 자전거도로 11.7㎞, 수질정

화습지 1개소, 휴게소 10개소, 다목적행사광장 1개소 등

□ 2006년도 추진계획

○ 자연형호안(자연석쌓기) 조성 0.8㎞, 산책로겸 자전거도로 1.4㎞

○ 진입계단 14, 진출입로 21, 휴게소 ․체육시설  9개소 등 사업 완료

※ 삼천 녹색관광 자원화 조성사업 별도 추진(녹지공원과)

전주천 자연형하천 정화사업

	추 진 배 경
○ 2002년 조성 완료된 전주천 자연형하천에 대하여 수질 및 생태계를 추가 보완하여 완벽한 하천으로 거듭나게 하고자 함

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 교동 한벽보～덕진동 삼천합류점

○ 사업규모 : 7.20㎞

○ 총사업비 : 1,277백만원

○ 사업기간 : 2005. ~ 2006. (2개년)

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	2005년도	2006년
계	1,277	575	702
국 비	894	345	549
시 비	383	230	153

□ 그간 추진상황

○ 전주천 자연형하천 조성사업 완공 ----------  2002.12.30

○ 전주천 자연형하천 정화사업 실시설계 용역 시행 -- 2005. 9.30

○ 용역준공 ------------------------------  2005.12.29

□ 2006년도 추진계획

○ 사전심사 발주의뢰 ----------------------- 2006. 2

○ 공사착공 ------------------------------- 2006. 3

○ 여울, 소, 어도 등 생태환경 개선 및 보완

○ 수생식물 식재 보완, 어도개량 3개소, 징검여울 및 소  조성

만경강 생태하천 가꾸기사업

	추 진 배 경
○ 오염된 만경강의 수질개선 및 하천생태계 복원으로 시민에게 쾌적한 휴식공간을 제공하고저 함

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 팔복동 추천대교 ～ 만경강 합류부

○ 사업규모 : L= 7.90㎞(전주천 5.7㎞, 만경강 2.2㎞)

○ 총사업비 : 16,637백만원

○ 사업기간 : 2001 ～ 2010 (10개년)

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

재원별	총사업비	2004까지	2005년도	2006계획	2007이후
계	16,637	3,898	646	584	11,509
국 비	10,772	3,078	323	434	6,937
도 비	598	258	-	-	340
시 비	5,267	562	323	150	4,232

□ 그간 추진상황

○ 기본계획 연구 및 기본설계 -------------- 2001. 4. 24

○ 하천개수 별도추진사업 완료(1.9㎞) ------- 2003. 12. 31

○ 만경강 생태하천 가꾸기사업 공사착공 ------ 2004. 11. 25

○ 추진실적 : 총 공정 대비 27%

- 1차분 완료 : 조경석쌓기 2.71㎞, 산책로겸 자전거도로

9.44㎞, 휴게공간 4개소, 운동시설 3개소 등

- 2차분 시행중(55%) : 호안사석부설 및 수제설치 2개소

□ 2006년도 추진계획

○ 조경석쌓기 0.24㎞, 호안사석부설 및 수제설치 2개소 - 2006. 3～10월

○ 산책로겸 자전거도로 마무리 3.83㎞ -------2006. 4～11월

아중천 생태하천조성 및 준설사업

	추 진 배 경
○ 매년 발생하는 도심하천인 아중천에 대하여 수질개선및 하천정비를 시행하여 재해사전 예방및 하천생태계 복원으로 녹색환경도시 조성

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 우아동 아중저수지 ～ 소양천합류부

○ 사업규모 : L= 2.88㎞

○ 총사업비 : 4,100백만원

○ 사업기간 : 2004 ～ 2008 (4개년)

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	2004까지	2005년도	2006계획	2007년 이후
계	4,100	330	-	1,000	2,770
국 비	2,460	200	-	600	1,660
도 비	820	60	-	200	560
시 비	820	70	-	200	550

□ 그간 추진상황

○ 1차공사 우선완료(190백만원 : 국․도비 잔액 활용) -- 2005. 4. 2

※ 식생호안블럭 설치 L= 0.5㎞

○ 실시설계 용역 완료(140백만원) ---------- 2005.12.27

□ 2006년도 추진계획

○ 전체 공사 착공 ----------------------- 2006. 3

-  호안정비 0.75㎞, 인도교설치 1개소

※ 예산 확보 상황에 따라 연차적 시행

덕진보 상류 수질오염 방지 사업

	추 진 배 경
○ 보상류 하상구조상 초기우수 유입 퇴적으로 오염, 악취등 민원발생 ○ 매년 봄철 5월중 갈수기에 부영양화 등 물고기 폐사사고 반복발생

□ 덕진보 현황

○ 위    치 : 덕진구 덕진동 명성강변아파트 앞

○ 시설규모 : 덕진보 높이 3.1m,  보 길이 88.4m

○ 총사업비 : 1,800백만원

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	2005까지	2006년도	2007년 이후
시 비	1,800	200	300	1,300

□ 그간 추진상황

○ 덕진보상류 준설관련 관계․전문가 자문회의 개최 --- 2005. 3.31

○ 덕진보 오니토 준설작업 시행 -------------- 2005. 5.20

○ 하가지구 개발로 용도폐지되는 덕진보개량 용역 추진 ---  2006. 1

※ 삼천 이수보개량 용역 동시 추진(서부신시가지 개발)

□ 2006년도 추진계획

○ 용역 준공 및 공사착수(보개량 및 준설) ------ 2006. 10

-전면철거시 상류의 급격한 하상변동으로 인한 시설등 피해우려가        있으므로 용역중 전문가 자문을 받아 적정한 높이로 개량

○ 초기우수 유입을 막기위한 상류 우․오수분리 하수관거 별도 정비

○ 보개량 부족예산 추경확보 : 1,300백만원(기확보 500백만원)

지방2급 하천정비기본계획수립

	추 진 배 경
○ 하천정비기본계획 수립후 수해개량복구 및 국․도비지원사업 가능 ○ 지가상승과 주변지역 급속한 개발 진행으로 하천구역고시 시급

□ 현    황

○ 대     상 : 26개 하천중 18개 하천(완료 8, 추진 8, 이후 10)

○ 소요예산 : 1,817백만원(도비 779, 시비 1,038)

○ 추 진 중 : 독배천외 6개하천 (717백만원)

- 소양천은 전라북도에서 추진중 (생태조성)

- 용역기간 : 2005.10 ～ 2006.10 (1개년)

○ 미수립하천 : 석산천외 9개하천 (1,000백만원)

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	2004까지	2005년도	2006년도	2007년 이후
계	1,817	100	717	-	1,000
도 비	779	-	279	-	500
시 비	1,038	100	438	-	500

□ 2006년도 추진계획

○ 관내 2급하천 실태조사 및 하천구간 조정 --- 2006. 2월

- 지방2급하천 구간조정, 폐지, 하천지정 등 검토

○ 독배천외 6개하천 하천구역 및 하천예정지 고시 --- 2006. 10월

만경강수계치수 중복천개수공사

	추 진 배 경
○ 익산지방국토관리청 관내 만경강수계를 대상 (조촌천 기시행) ○ 사전 수해경감과 예방을 도모할 수 있는 종합적 하천시설물로 정비

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 삼천동 부근～효자동 삼천합류점

○ 사업규모 : 용지매입 및 하천개수 L=3.5㎞

○ 총사업비 : 32,000백만원 (전액국비)

○ 사업기간 : 2004 ～ 2010 (7개년)

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	2004년까지	2005년도	2006년도	2007년 이후
계	32,000	107	1,930	14,000	15,963
국 비	32,000	107	1,930	14,000	15,963

□ 그간 추진상황

○ 2005년도 예산배정 : 1,930백만원(공사비330, 보상비1,500, 감리비100)

○ 위․수탁공사 협약 체결(익산청⇔전주시) --- 2003. 6. 9

○ 하천정비시행계획 고시 ------------------ 2005. 8. 2

○ 토지 및 지장물보상 협의 시작 ------------ 2005. 8～

○ 공사 총괄계약 및 1차분 공사 착공 --------- 2005.10.21

※ 1차분 : 호안 및 축제 L=0.2㎞(330백만원)

□ 2006년도 추진계획

○ 1차분 공사 완료 ---- 2006. 6월

○ 2차공사 편입토지 지장물 보상 ---- 2006. 2 ～10월

○ 2차공사(1.0km, 140억원) 시행-----  2006. 3 ～11월

하수처리장 기존1,2단계 고도처리사업

	추 진 배 경
○ 하수도법 개정으로 강화된 N,P등 수질기준에 맞게 기존시설 개량 ○ 하수처리장 시설개선으로 만경강등 새만금유역 수질개선 도모

□ 사업 개요

○ 위    치 : 덕진구 송천동2가 1035번지 환경사업소내

○ 사업규모 : 303천톤/일 고도처리공법개선(표준활성법 → CNR공법)

○ 사업기간 : 2002 ～ 2007 (6개년)

○ 사 업 비 : 60,000백만원(국30,000,  도15,000,  시15,000)

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	’04년까지	’05년도	’06계획	’07이후
계	60,000	29,560	747	6,970	22,723
국 비	30,000	17,615	498	4,132	7,755
도 비	15,000	8,807			6,193
시 비	15,000	3,138	249	2,838	8,775

□ 그간 추진상황

○ 고도처리공사 착공 ---------------------- 2004.10.24

○ 공동구 및 방류펌프장 구조물공사 완료 ----- 2005.10.30

○ 수처리공정 2단계(200천톤) 완료예정 -------- 2006. 2.28

□ 2006년도 추진계획

○ 수처리공정 1단계(103천톤) 완료 및 시운전 ---- 2006. 10

○ 전기, 기계, 계장공사 및 사업 준공 -------- 2007. 4

화산․덕진처리구역 하수관거정비사업

	추 진 배 경
○ 하수관거 우․오수 분리를 통하여 민간위탁중인 하수처리비 절감하고 전주천, 삼천 수질개선과 정화조 폐쇄로 시민 보건위생 향상

□ 사업 개요

○ 위    치 : 화산처리구역 1․4․7분구, 덕진처리구역 1분구

○ 사업규모 : 우․오수관 분리등 관거정비 70㎞

○ 사업기간 : 2004 ～ 2007 (4개년)

○ 사 업 비 : 39,728백만원(국 19,583,  시 20,145)

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	’04년까지	’05년도	’06계획	’07이후
계	39,728	7,781	18,588	5,882	7,477
국 비	19,583	3,952	9,294	2,529	3,808
시 비	20,145	3,829	9,294	3,353	3,669

□ 그간 추진상황

○ 1차분(동서학동 산성천 부근) L= 8.3Km 공사완료 --- 2005.07.14

○ 2차분(덕진동 호반촌 부근) L= 2.9Km 공사완료 --- 2005.09.09

○ 3차분(금암동 대학병원 부근, 인후동 금평초교 부근) 시공중

- 계획연장 L= 12.6Km 중 8.0Km 완료(2005. 12)

□ 2006년도 추진계획

○ 3차분 잔여구간 (4.6km 12,338백만원) 완공 ------- 2006. 12월

○ 4차분(효자택지, 서신2택지 16km 14,000백만원) 착공 --- 2006. 3월

하수종말처리 차집관거 시설 사업

	추 진 배 경
○ 농촌동 지역에서 발생하는 오수를 상류에서 차집 공공수역의 수질개선 ○ 오수관을 정화조까지 연결 폐쇄하여 시민의 보건위생 향상

□ 사업 개요

○ 위    치 : 농촌동 3개마을(동서학동 내원당, 외원당, 객사)

○ 사업규모 : 하수관거 정비 L=8.5㎞

○ 사업기간 : 2004 ～ 2007 (4개년)

○ 사 업 비 : 2,272백만원(국 1,136,  도 568,  시 568)

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	’04년까지	’05년도	’06계획	’07이후
계	2,272	204	531	507	1,030
국 비	1,136	122	354	264	395
도 비	568			132	436
시 비	568	82	177	111	199

□ 그간 추진상황

○ 사업계획 확정 통보(환경부)  --------------- 2004.12. 7

○ 기본계획 및 실시설계 용역완료  ------------ 2005. 9.12

○ 실시설계 용역결과 초과 사업비(10억원정도) 환경부 협의  ----- 2005.11. 1

○ 공사발주 의뢰(조달청) --------------------- 2006. 1.11

□ 2006년도 추진계획

○ 동서학동 객사마을 (3.2km, 1,100백만원) 완공 : 2006. 12

하수관거정비(BTL)민간투자사업

	추 진 배 경
○ 민간자본 유치로 지역경기를 활성화 하고 정화조 폐쇄로 시민부담 경감 ○ 전주천, 삼천 수질개선 및 민간위탁중인 하수처리비 절감

□ 사업개요

○ 위    치 :  전주시 일원(덕진, 아중, 중앙, 화산, 효자처리구)

○ 사 업 량 : 하수관거 정비(우․오수 분리) L = 128Km

○ 사 업 비 : 1,100억원정도

○ 사업기간 : 2005 ～ 2009(5개년)

□ 그간 추진상황

○ 업무 위․수탁 협약체결(환경부, 도, 시, 환경관리공단) --- 2005. 6. 9

○ 도비지원요청 및 지원계획 통보(시↔도) ----- 2005. 6. 3

○ 시설사업 기본계획고시(민투법 제8조, 10조) --- 2005. 6. 17

○ 시의회 의무부담행위 동의안 의결 ----------- 2005. 9. 9

○ 민간사업자 사업계획서 평가 및 우선협상대상자 선정 --- 2005.10.13

- 전주아랫물길(주)(GS,KCC,화신,중앙,성전,성우건설)

○ 우선협상대상자와 협상진행중(본협상 및 실무협의 4회)

□ 2006년도 추진계획

○ 제2차 본협상(마무리) -------------------- 2006. 2

○ 환경관리공단의 최종 협상안을 전문기관(KDI)등의 자문후 협약

○ 도로굴착 협의등 행정사항 완료후 우선시공분 착공 --- 2006. 3

○ 시설사업 실시계획 승인 및 본공사 착공 ----- 2006. 6

하수처리장 민간위탁 관리

	추 진 배 경
○ 민간위탁업체에 대한 지도․감독강화로 하수처리와 시설물 관리등 운영 부실예방 ○ 처리장 침수, 무단방류, 정전, 악취발생등 각종 환경사고 사전차단

□ 사업 개요

○ 위탁업체 : 전주개발(주) ․ 운영업체 : (주)태영환경

○ 규    모 : 하수 403천톤/일, 위생 290㎘/일

○ 기    간 : 2004.12.01～2024.11(20년간)

○ 운 영 비 : 7,620백만원(하수처리장6,840, 위생처리장480, 대수선300)

□ 그간 추진상황

○ 협약보증수질                                (단위 ㎎/ℓ)

항목 구분	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균	비고
1․2단계	20	33	20	27	2.5	3000	고도처리완료이전까지
3 단계	10	40	10	20	2.0	2000	법적수질기준

○ 하수처리 기준사용료 조정(45.48원/㎥→45.27원/㎥) ---- 2005. 2. 4

○ 하수처리 주요 기계․전기설비 전문가 합동 중점지도 -- 2005. 6. 10

○ 하절기 포기조 사멸방지 1단계 유입원 조사 -- 2005. 7. 8

○ 악취개선 대책수립 등을 위한 특별점검 ----2005. 9

○ 방류수 수질관리 8회(시 :4회, 환경청 4회) --- 수시

□ 2006년도 추진계획

○ 완벽한 시설운영으로 단 한건의 사고가 없도록 관리감독 강화

○ 차집관로 송천동 분내마을, 전주천, 삼천등 우수토실 일제정비 20개소

○ 강우시 전주시와 위탁업체 주야간 비상근무체제로 운영

○ 매월 1회이상 민간위탁 운영실태 점검으로 사고예방

2005년 8. 2～8. 3 수해복구사업

	추 진 배 경
○ 피해원인을 면밀히 조사 분석하여 완벽한 개량복구 추진 ○ 자연환경 및 주변여건을 고려한 친환경적 시설물로 복구

□ 복구계획

○ 재원현황                                   (단위: 백만원)

구 분	총복구액	국 비	도 비	시 비	자부담	자체복구
계	25,292	17,652	2,951	3,957	592	140
사유시설	1,826	1,079	66	90	592	-
공공시설	23,465	16,573	2,885	3,867	-	140

○ 공공시설 현황                            (단위:백만원,개소)

구 분	합 계	도 로	하 천	상하수도	수리시설	사방임도	기 타
수 량	107	7	23	4	20	12	41
복구액	23,465	1,906	11,191	2,071	2,735	1,650	3,912

□ 그간 추진상황

○ 중앙․도 합동조사반 현장 피해조사 ----- 2005. 8.17

○ 호우피해 복구계획 확정통보(소방방재청) -- 2005. 9. 1

○ 예산성립전 사용승인 결정(국․도비보조금)-- 2005. 9.23

○ 공사설계 추진 ------------------- 2005.10～2006.01

※ 공공시설 복구 : 총107건중 완료 9건, 공사중 51건, 발주중 47건

□ 2006년도 추진계획

○ 소규모 수해 복구공사 우기전 완료 ------- 2006. 6

○ 중인천(2.6km 20억원) 복구공사 완료 ----- 2006. 12

○ 독배천( 5km 70억원) 복구공사 완료 ------ 2007. 6

차량등록사업소 소관

ꊱ	인터넷 자동차등록 시스템 구축 ------------	54
ꊲ	건설기계등록 처리기간 1/2 단축운영 -----------	55
ꊳ	다시찾고싶은『차량등록사업소』이미지혁신 ----	56

인터넷 자동차등록 시스템 구축

	추 진 배 경
○ 자동차등록 민원처리 절차상 대기 시간이 많아 불편초래 ○ 인터넷 민원환경을 조성 정보화 시대에 맞는 서비스 제공

□ 사업개요

○ 자동차 등록민원 환경개선

- 현행 방문처리에서 비 방문 인터넷 민원서비스 체제 구축

○ 인터넷 등록업무 범위

- 신규, 이전, 변경, 말소등록신청

- 취득세, 등록세, 증지, 공채, 과태료 전자납부서비스

○ 사업비 : 시스템 개발비 40,000천원

□ 2006년도 추진계획

○ 자동차등록 인터넷 시스템 구축

- 온라인 등록 시스템 개발 용역 발주 --------- 2006. 3

- 온라인 등록 서비스 개시 ------------------ 2006. 8

○ 자동차등록 인터넷 시스템 홍보

- 인터넷 시스템 안내전단 제작 --------------- 2006. 6

- 인터넷 시스템 매뉴얼 책자 제작 ------------ 2006. 7

- 온라인 자동차등록 시스템 시연회 개최 ------- 2006. 7

건설기계등록 처리기간 1/2 단축운영

	추 진 배 경
○ 건설기계 이전등록 처리 장기간 소요로 민원인 불만 초래 ○ 유기민원의 투명성 제고와 수요자 중심의 행정서비스 제공

□ 추진방향

○ 기간단축 대상 유기민원사무

- 건설기계 신규 및 이전등록신청 민원

○ 민원 처리기간 단축운영

- 이전등록신청

․현행 법정 처리기간 20일에서 10일로 단축

- 신규등록신청

․건설기계 신규등록업무 10일에서 5일로 단축

□ 추진계획

○ 이전등록신청 민원 처리절차 개선

- 신청서류 해당 시·군으로 우편발송에서 전자문서로 통보

전자문서에 신청서류 스캔받아  첨부 현 등록 기관에 전송

○ 해당 시·군에 전화독촉

- 현 등록기관에 등록원부 신속히 우송토록 전화독려

○ 민원처리 완결과 동시 민원인에게 전화 통지

○ 최종 추진목표

- 현재 처리율 40~50%에서 70%이상 기간단축

다시찾고싶은『차량등록사업소』이미지 혁신

	추 진 배 경
○ 자동차 등록업무의 전문성 제고로 일류 민원행정 실현 ○ 업무능력개발과 고품질서비스로 신뢰받는 공무원상 구현

□ 추진방향

○ 민원행정 혁신운동 추진

- 변화와 혁신을 선도할 수 있는 교육훈련 강화

○ 업무능력개발 전문성 확보

- 민원업무 능력 배양을 위한 토론 및 학습의 날 운영

○ 차량등록 행정서비스 품질 향상

- 민원인과의 신뢰구축을 위한 친절서비스 훈련 강화

□ 2006년도 추진계획

○ 직장교육 훈련강화

- 능력개발과 전문성 확보를 위한 연간교육계획수립 : 26명

- 실무능력향상을 위한 학습의날 지정 운영 : 월1회

○ 차량등록행정 혁신 워크숍 개최

- 정보교류와 업무혁신을 위한 워크숍 개최 : 2회(반기)

- 유관기관간 협력체계구축 간담회 개최    : 2회(반기)

○ 서비스 매너 향상 친절서비스 훈련

- 전문가 초빙 효과적인 의사전달방법 교육 : 2회