제239회 전주시의회 제2차 정례회 행정사무감사 / 문화경제위원회

2006년도

주요업무 추진상황 보고

전주시동물원

http:zoo.jeonju.go.kr

보  고  순  서

▢ 일    반    현    황  ------- -------  2

▢ 2006 주요업무추진상황

○ 순계류사 신축 --------------------------------  4.

○ 공중화장실 신축 -----------------------------  5.

○ 노후 상수도관 교체 ------------------------  6.

○ 동물원 환경개선사업 ----------------------  7.

동 물 원 현 황

(12. 31현재)

□ 연 혁

○ 소재지 : 전주시 덕진구 덕진동 1가 73-48

○ 면  적 : 126,000㎡(38천평)

○ 연  혁

- ’78. 4월 : 시민공원 결정고시(건설부 제100호)

- ’78. 6월 : 동물원 개원

- ’90. 4월 : 전주시 공원관리사무소 기구확대(소장, 2과, 4계)

- ’97. 2월 : 전주시 동물원으로 개편(원장, 2팀)

- ’01. 1월 : 팀 증설(진료팀 신설)

□ 조 직

			동 물 원 장
운영팀 (10명)			사육팀 (12명)				진료팀 (4명)

구 분	계	5급	6급	7급	8,9급	기능 계약직	별정직
정 원	26	1	3	5	3	12	2
현 원	26	1	3	4	4	12	2
과부족	□	□	□	□	□	□	□

□ 직원 현황

※ 정□현원 외 직원 : 10명(청경 5, 일용 5)

□ 동물 보유 현황

계	포유류	조 류	파충류	어 류
99종 (695마리)	44종 (209마리)	50종 (314마리)	3종 (6마리)	2종 (166마리)

□ 동물사 시설현황

계	포유류	조류	파충류	어류
22동 (16,065.2㎡)	14동 (10,518.2㎡)	6동 (3,168.3㎡)	1동 (28.7㎡)	1동 (2,350㎡)

□ 놀이시설 현황

○ 명  칭 : 전주드림랜드

○ 면  적 : 2,810㎡(851평)

○ 기종수 : 12종

- 대관람차, 청룡열차, 전자전투기, 귀신의집, 공중자전거,

회전목마, 범퍼카, 회전오리, 밧데리카, 회전그네, 전자오락,       바이킹(’06.4월 신설)

○ 연간사용료 : 365,500천원

□ 기타시설 현황

○ 관리사무소 : 2층, 400㎡(121평), 콘크리트 슬라브

○ 휴게소 : 1층, 486㎡(147평)

○ 주차장 : 27,002㎡(8,182평, 770대 주차 가능)

○ 노리하우스(어린이 방송세트 전시장) : 2,326㎡(704평)

□ 입장객 증감추이

(단위 : 명, %)

연도별	총 입장객수	일반(20세이상)		청소년(14~19세)		어린이(4~13세)		전년비 증감율
		입장객수	비율	입장객수	비율	입장객수	비율
2005	547,209	342,644	62.6	38,078	7.0	166,487	30.4	-65,766 ▲10.7%
2004	612,975	397,143	64.8	41,221	6.7	174,611	28.5	-57,773 ▲8.6%
2003	670,748	448,585	66.9	46,084	6.8	176,079	26.3	-23,200 ▲3.3%
2002	693,948	443,600	63.9	44,637	6.4	205,711	29.6	-2,915 ▲0.4%

▲ 입장객 감소사유

- ‘78년 개원된 폐쇄형 동물사에 노후화로 관람환경 열악

- ‘02. 5월 대전동물원 개원 이후 입장객 감소 추세

- 출산율 감소에 따른 가족 관람객 감소

- 동물과 가까운 곳에서 체험할 수 있는 여건 결여

순 계 류 사   신 축

자연 친화적이고 동물의 서식에 적합한 동물사로 신축

하여 사육환경 개선 및 수준 높은 관람 공간 제공

□ 사업 개요

○ 사업내용 : 동물사 A=161㎡, 방사장 A=172㎡

○ 사 업 비 : 200백만원

○ 사업기간 : 2006. 10. 13 ~ 2007. 1. 27

□ 추진 상황

○ 기본계획수립 및 실시설계  : 2006. 3. ~ 2006. 5.

○ 덕진공원 조성계획 변경    : 2006. 5. ~ 2006. 6.

○ 실시계획인가 및 건축협의  : 2006. 7. ~ 2006. 8.

○ 2006. 11월 현재 공정 80% (조적 및 창호공사 중)

□ 금후 계획

○ ’06. 12월 중순 혹한기 이전 준공 목표

공 중 화 장 실  신 축

부족한 공중화장실을 신축하여 동물원을 찾는

관람객에게 편안한 관람환경 제공

□ 사업 개요

○ 공중화장실 : A=97㎡

- 변기 15개(장애인변기 2개, 유아용변기 2개, 남자 3개, 여자8개)

※ 화장실내 여성휴게실(수유실, 유아기저귀 교체실) 설치

○ 사 업 비 : 150백만원

○ 사업기간 : 2006. 9. 28 ~ 2007. 1. 17

□ 추진 상황

○ 기본계획수립 및 실시설계  : 2006. 3. ~ 2006. 5.

○ 덕진공원 조성계획 변경    : 2006. 5. ~ 2006. 6.

○ 실시계획인가 및 건축협의  : 2006. 7. ~ 2006. 8.

○ 2006. 11월 현재 공정 80% (조적 및 창호공사 중)

□ 금후 계획

○ ’06. 12월 중순 혹한기 이전 준공 목표

노 후 상 수 도 관  교 체

노후 상수도관을 교체하여 누수를 방지하고 깨끗한

음용수 공 급으로 건강하고 쾌적한 동물원 조성

□ 사업 개요

○ 사업내용 : 노후수도관 전면교체(PVC관⇒ HI-3P관)

- 연장 및 관정 : L = 1,300m, D = 150 ~ 25mm

- 각 동물사 주인입관 교체설치 및 제수맨홀 설치

○ 사 업 비 : 200백만원

○ 사업기간 : 2006. 9. 4 ~ 2007. 1. 27

□ 추진 상황

○ 현황파악 및 관로계획 수립 : 2006. 4. ~ 2006. 5.

○ 실시설계 및 설계사전심사  : 2006. 5. ~ 2006. 6.

○ 2006. 11월 현재 공정 85% (동물사 주인입간 공사중)

□ 금후 계획

○ ’06. 12월 초순 준공 목표

동 물 원  환 경 개 선  사 업

동물원의 낡은 기반시설을 보완하고 관람객의 편의시설을

확충하여 깨끗하고 편안한 기초 환경 조성

□ 사업 개요

○ 주요사업내용

- 노후 동물사(곰사, 사자 □ 호랑이사 등) 보수

- 노후 기반시설(보도블럭, 상하수도 등) 개선

- 동물원 관리시설물(음수대, 음향시설 등) 유지 □ 관리

○ 사 업 비 : 100백만원

□ 추진 상황

○ 동물원 주차장 도색공사 외 18건 완료

□ 금후 계획

○ 2007 동물원 장기 발전계획 수립 시행 예정 연차적으로

노후한 동물사 개선 추진

○ 폐동물사 철거 후 꽃길 및 쉼터 공원 조성으로 동물원을

찾는 방문객에게 휴식 공간 제공