제239회 전주시의회 제2차 정례회

행정사무감사 / 도시건설위원회

2006년도

주요업무 추진상황 보고

교   통   국

보  고  순  서

□	일 반 현 황		-----------	1
□	부 서 별 주 요 기 능		-----------	2
□	2006 주요업무 추진상황		-----------	7
	○	교 통 행 정 과	-----------	7
	○	교 통 시 설 과	-----------	14
	○	도 로 과	-----------	20
	○	재난안전관리과	-----------	37
	○	하수관리과	-----------	47
	○	차량등록사업소	-----------	57

일  반  현  황

□ 기   구 : 5과 1사업소 22담당

																					교 통 국
	교통행정과 (4 담 당)							교통시설과 (3 담 당)								도 로 과 (4 담 당)											재난안전 관 리 과 (4 담 당)							하수관리과 (3 담 당)							차량등록 사 업 소 (4 담 당)
	교통행정							교통시설								도로행정											민 방 위							하수행정							등 록 1
	대중교통							경 전 철								도로시설											재난관리							하수시설							등 록 2
	교통지도							교통정보								도로정비
																											복구지원
																																		하수정비							보험지도
	주차장관리															도로경관											하천관리														건설기계

□ 정‧현원

과 별		총 계	일 반 직						계약	기능
			4급	5급	6급	7급	8급	9급
계	정 원	100	1	6	21	33	17	3	2	17
	현 원	100	1	6	21	47	5	1	2	17
교통행정과	정 원	18	1	1	4	10	1			1
	현 원	18	1	1	4	10	1			1
교통시설과	정 원	16		1	2	4	2		2	5
	현 원	16		1	2	5	1		2	5
도 로 과	정 원	15		1	4	4	5			1
	현 원	15		1	4	8	1			1
재난안전 관 리 과	정 원	14		1	4	7	1			1
	현 원	14		1	4	7	1			1
하수관리과	정 원	12		1	3	5	2	1
	현 원	12		1	3	7	1
차량등록 사 업 소	정 원	25		1	4	3	6	2		9
	현 원	25		1	4	10	0	1		9

부서별 주요기능

과 별	분 장 사 무
교통행정과	○ 교통종합계획 수립 ○ 대중교통(버스, 택시, 화물) 업무 추진 ○ 자동차운송사업체(버스, 택시, 화물 등) 지도감독 ○ 공영주차장 확충 및 관리, 교통영향평가업무
교통시설과	○ 도로교통 안전시설물 설치 및 유지관리 ○ 어린이 보호구역 정비사업 추진 ○ 경전철 사업 추진 ○ 전라선 복선화 사업 ○ 시내버스 정보화사업(BIS) 추진 및 운영관리 ○ 지능형 교통체계(ITS) 추진 및 운영관리
도 로 과	○ 도로부지관리, 도로안내표지판 설치관리 ○ 도로포장 보수지도, 자전거도로 시설, 가로등관리 ○ 신규도로개설 및 용지보상, 도시가로망 확충사업 ○ 가로환경 및 노점상 지도단속, 자전거이용 활성화
재난안전 관 리 과	○ 민방위 계획수립 및 추진 ○ 재난방재 종합계획수립 및 시행, 재난재해대책추진 ○ 자연하천조성사업, 하천관리(국,공유재산 관리)
하수관리과	○ 하수도 공기업특별회계 운영 ○ 하수도 정비기본계획 수립 및 시행 ○ 하수관거정비사업 추진 ○ 하수종말처리시설 운영관리
차량등록 사 업 소	○ 자동차 등록(전산입력, 자료관리 및 증명발급 등) ○ 자동차 및 건설기계 과태료부과 ○ 건설기계등록(전산입력, 증명발급,검사최고, 정비명령 등) ○ 무보험차량조사(손해배상보장법위반 과태료, 범칙금부과 등)

□ 기본현황 - 2006. 10. 31. 현재

○ 운수업체

(단위 : 개소/대)

구 분	계	버 스			택 시		화 물		렌트카	특수 여객
		시내	시외	관광	회 사	개 인	회 사	개 인
업 체 수	177	5	5	19	25		78		31	14
보유대수	10,928	399	1,414	409	1,599	2,254	1,747	1,951	1,128	27

○ 도    로

(단위 : 개소, ㎞)

구 분	계		고속국도		일반국도		지 방 도		시 도
	노선	연 장	노선	연 장	노선	연 장	노선	연 장	노선	연 장
총연장	850	407	1	5	5	62	3	22	841	318
포장도	850	407	1	5	5	62	3	22	841	318
포장율 (%)		100		100		100		100		100

※ 도로율 : 16.28%(도로면적/시가지면적)

○ 교량 및 기타 시설물

(단위 : 개)

구분 계	교 량					육교 보도	지하 보도	지하차도	터널	비 고
	소계	고속 국도	시의 국도	지방도	시도
122	103		34	3	66	6	6	5	2

※ 장대교량(삼례교 : 570m,  회포대교 : 707m)

○ 옥외광고물 현황

(단위 : 개)

광고업자 등록현황	시 지 정 광 고 시 설				비 고
	계	게시대	벽보판	기 타
430	515	150	365	-

○ 하  천

(단위 : ㎞)

구 분		개소	하천연장	제 방 연 장			개수율 (%)	비고
				계	기개수	미개수
계		24	100.5	177.7	141.3	36.4	79.5
법정하천	소 계	21	94.5	164.9	134.9	30.0	81.8
	국가하천	3	14.4	28.8	28.8	-	100.0
	지방 1급	2	19.8	39.6	38.6	1.0	97.5
	지방 2급	16	60.3	96.5	67.5	29.0	70.0
소 하 천		3	6.0	12.8	6.4	6.4	50.0

○ 하 수 도

구 분		처리구역 (㎢)	계획연장 (㎞)	시설연장 (㎞)	미시설연장 (㎞)	보급율 (%)	비고
계		53.1	2,317	1,321	996	57.0
합 류 식		18.9	653	653	0	100.0
분류식	소 계	34.2	1,664	668	996	40.1
	오수관거	-	920	435	485	47.2
	우수관거	-	744	233	511	31.3

○ 하수․위생처리 시설

구 분	하 수 처 리	위 생 처 리
위 치	덕진구 송천동 2가 1130번지
시설용량	1일 처리능력 ⇨ 403,000㎥ - 1단계 시설 : 103,000㎥ - 2단계 시설 : 200,000㎥ - 3단계 시설 : 100,000㎥	1일 처리능력 ⇨ 290㎘ - 분 뇨 : 30㎘ - 정 화 조 : 260㎘
처리방법	1․2단계 표준 활성 슬러지법 3단계 고도처리(CSBR) 공법	하수 연계처리 (1994년부터 시행)

○ 차집관로

하 천 명	연 장 (㎞)	맨 홀 (개)	우수토실 (개소)	환기구 (개소)	여수토실 (개소)
계 (6개노선)	71.8	1,010	251	73	5
전주천 (좌, 우안)	30.0	369	142	37	4
삼 천 (좌, 우안)	13.4	155	45	18
금암천 (좌, 우안)	2.9	82	38	9
아 중 선	11.4	174	16	4
팔복선(공장,생활)	10.8	183	8	5	1
상 관 라 인	3.3	47	2

○ 자동차등록

(단위 : 대)

합 계	승 용 차	승 합 차	화 물 차	특 수 차
207,620	156,224	12,496	38,582	318

교통행정과  소 관

ꊱ	권역별 순환버스 및 무료환승제 시행 ----	8
ꊲ	버스업계 경영개선 지원 및 투명성 제고 --	9
ꊳ	택시 총량제 시행에 따른 개인택시 신규면허 공급 ----	10
ꊴ	사업용 차량 안전 운송질서 확립 ---------	11
ꊵ	불법 주․정차 지도단속 효율성 제고 -----	12
ꊶ	주차 시설 확충 ------------------------	13

권역별 순환버스 및 무료환승제 시행

	추 진 배 경
○ 수요자 중심의 노선조정으로 시내버스 만족도 및 이용율 제고 ○ 교통소통 개선, 수송효율 제공 등 버스 운행관리의 효율화

□ 사업개요

○ 시내버스 무료환승제

- 대상 : 시내권역에 모든 시내버스 1회 무료 환승

- 방법 : 버스 하차시 교통카드를 단말기에 입력한 후 30분이내 환승

○ 권역별 순환버스 운영

- 운행노선 : 4개 권역별 환승 네트워크 구성

- 운행대수 : 36대, 15～20분 간격 운행

□ 추진상황

○ 시내버스 환승체계 및 노선조정 용역 --- 2005. 9 ～12

○ 지역설명회(18개지역) 및 시민 홍보 --- 2006. 1 ～ 3

○ 시행 준비(하차단말기 등) 및 시험운행 - 2006. 2 ～ 3

○ 무료환승제 본격시행 ------------------ 2006. 3. 15

- 무료환승 실적(3~9월) : 1,572천명

- 교통카드 이용률 증가 : 40%➩50.6%

□ 금후계획

○ 무료환승 및 순환노선제 운행 손실보전방안 협의 및 지원

○ 2단계 노선체계 개편 시행

- 순환노선 확대, 굴곡 장거리 노선, 불합리한 노선 및 배차간격 조정, 적자 과다노선 감차, 공휴일 감회 등

버스업계 경영개선 지원 및 투명성 제고

	추 진 배 경
○ 버스업계 경영개선 지원으로 양질의 대중교통서비스 제공 ○ 재정지원금 적기집행으로 경영난 해소 및 종사자 생활 안정 도모

□ 사업개요

○ 전주시 대중교통계획(5년 단위) 수립

- 근    거 : 대중교통의육성및이용촉진에관한법률

- 계획내용 : 대중교통의 체계적 육성지원, 대중교통이용 촉진 방안

○ 재정지원금 적기 집행 : 6,766백만원 정도

- 적자노선 손실보전 3,643, 손실보전(벽지노선, 무료환승) 1,564,

유가보조금 1,109   대․폐차 지원 450

□ 추진상황

○ 재정지원금 지원 : 4,221백만원

- 적자노선 손실보전 2,733, 손실보전(벽지노선, 무료환승) 1,564,

유가보조금 851, 대․폐차 지원 330

□ 금후계획

○ 전주시 대중교통계획 및 연차별 시행계획 용역 발주 - 2006. 11

○ 전주시 대중교통기본계획 고시 ---------------------- 2007. 6

○ 운수업계 유가보조금 및 재정지원금 적기 지급 - 월․분기별

택시 총량제 시행에 따른 개인택시 신규면허 공급

□ 택시 공급현황

구 분	인 구	택 시 대 수			인구 1,000명당 대 수
		계	법 인	개 인
전 주 시	625,113	3,853	1,599	2,254	6.16대

※ 인구 천명당 : 수원 4.27, 안양 4.30, 청주 6.05, 창원 2.97, 포항 5.46

□ 최근 개인택시 증차현황

연 도	2001	2002	2003	2004	2005	2006	비 고
증차대수	0	67	68	65	61	36	평균59.4

□ 추진상황

○ 택시 총량 산정 및 중장기 공급계획 용역 - 2005.10.31～2006.2.24

◆ 실차율 모형에 의한 택시총량 산정 : 131대 증차(5년간)

3,950 = 3,819 × 51.10/53.00 × 85.83%/80.00%

○ 택시 총량 결정을 위한 개인택시면허심사위원회 개최 - 2006. 6. 2

- 2009년도 기준 총량 : 3,950대

- 개인택시 중장기 공급계획 확정 : 131대

[2005년 36,  2006년 30,  2007년 25,  2008년 20,  2009년 20]

○ 2005년도분 모집공고 ----------- 2006. 6. 27 ~ 7. 11

○ 신청서 접수 및 현지실사 -------- 2006. 7. 12 ~ 7. 19

○ 이의 신청 접수 ----------------- 2006. 8. 21 ~ 8. 25

○ 면허대상자 통지 및 공고 -------- 2006. 9. 11

□ 금후계획

○ 2006년도분 신규면허 공급계획 공고 - 2006. 12월중

사업용 차량 안전 운송질서 확립

	추 진 배 경
○ 운송업체 지도점검을 강화하여 상시 교통 안전기반 구축 ○ 사업용 차량의 준법 및 친절운행으로 교통사고 예방 및 이용객 서비스 제고

□ 사업개요

○ 운수업체 안전지도 합동점검(3,119업체) : 분기 1회

- 버스 5, 택시 25, 화물 80, 개인택시․개별화물 3,094

○ 사업용 차량 불법운행 지도단속 : 수시

○ 교통불편신고센터(120번민원, 인터넷 신문고) 운영

□ 추진상황

○ 운수업체 지도 점검 --------  51건

- 과징금 부과 14,  주의 20,  시정 17

○ 사업용차량 불법운행 단속 -- 108건

- 과징금 부과 41, 경고 13,  현지시정 37,  불문 17

○ 교통 불편신고 접수 처리 --- 206건(120번민원 104, 신문고 59)

- 불친절 69, 결행 36, 조․연발 10, 무정차 23, 휴조 16, 난폭운전 2, 기타 50

□ 금후계획

○ 운수업체 안전지도 정기점검(분기 1회) 및 불시 단속 확행

○ 화물 다단계 운송 알선행위, 차고지 외 밤샘주차 단속 강화

○ 교통 불편신고센터 연중 지속 운영 - 120번, 인터넷신문고

불법 주∙정차 지도단속 효율성 제고

	추 진 배 경
○ 상습 불법 주정차로 인한 교통정체구간 소통 개선 ○ 선진 교통문화 및 주차질서 정립을 위한 시민의식 제고

□ 주차단속반 운영 현황

○ 단속구간 : 318개 구간 215km

○ 단속인력 : 79명(완산 43 , 덕진 36)

○ 단속반 운영 : 25개조(주간 14, 아침‧야간 7, 공휴일 4)

□ 사업개요 ---------------------------- 3개사업 759백만원

○ 교통서포터스 운영(주차질서 계도) ---- 50명   100백만원

○ PDA를 활용한 단속으로 효율성 제고 --- 28대     59백만원

○ 불법주정차 무인단속시스템 확대 구축 - 20개소 600백만원

□ 추진상황

○ 상반기 교통서포터스 모집 운영(12개소  50명) ---- 2006. 4～7

○ PDA 단말기 및 프로그램 구입 설치 ------ 2006. 8～9

○ 하반기 교통서포터스 운영 ------------------ 2006. 9~12

□ 금후계획

○ 하반기 교통서포터스 운영(50명)

○ PDA 활용 단속 실시 -------------------- 2006. 10~

○ 불법주정차 무인단속시스템 구축

- 무인단속카메라 설치 및 시험운영 -------- 2007. 2

주 차 시 설  확 충

	추 진 배 경
○ 주차공간의 지속적 확충으로 주차난의 근원적 해소 ○ 시민 주차의식 전환으로 선진 주차문화 정착

□ 사업개요

○ 도심공영주차장 조성 :  1개소 150면   2,000백만원

○ 카풀주차장 조성    :  2개소 160면    800백만원

○ 녹색주차마을(그린파킹) 조성 : 2개소 4,000백만원

□ 추진상황

○ 주차수급 실태조사 용역 -------------- 2005.11～2006.7

○ 남원방면 카풀주차장 조성(300백만원) - 2005.12~2006.10

○ 그린파킹 실시설계 용역 ------------- 2005.11～2006.11

○ 그린파킹 시범지역(2개소) 선정 ------ 2005.12

□ 금후계획

○ 도심공영 주차장 조성

- 대상지 선정 및 부지매입(900백만원) ---- 2006.12

- 설계 및 조성공사 추진(1,100백만원) ---- 2007. 3~12

○ 진안․장수방면 카풀주차장 조성(500백만원) - 2006.12~2007.10

○ 그린파킹 조성

- 시범가로 2개소 사업추진(1,000백만원) - 2006. 11～2007. 5

- 조성 대상지 잔여 구역 사업추진(3,000백만원) - 2007.6~2008.12

교통시설과 소관

ꊱ	교통사고 예방 안전시설물 확충 및 정비 ---	15
ꊲ	어린이 보호구역 개선사업 --------------	16
ꊳ	전주 경전철 건설사업 -----------------	17
ꊴ	어린이 교통안전 체험관 운영 -----------	18
ꊵ	교통신호시스템 효율적 운영관리 --------	19

교통사고 예방 안전시설물 확충 및 정비

☞ 교통사고 줄이기 목표

- 자동차 1만대당 사망자 3.5인 ⇒ 2.0인(OECD 선진국 기준)

- 자동차보험 손해율 78.5% ⇒ 전국평균 71.6%이하로 개선

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 관내

○ 사업기간 : 2006. 1 ～ 2007. 1

○ 사 업 비 : 2,242백만원(국비 46, 시비 2,196)

○ 사업내용

- 교통안전시설 정비 및 차선도색외 5개사업 ---- 1,450백만원

- 사고잦은지점 불합리한 교차로 구조개선 1개소  -----    92 백만원

- LED 신호등 설치 7개 교차로 -------------- 100백만원

- 위치부적정 신호등 이설 및 가로 안전시설물 집약화 --- 600백만원

□ 추진상황

○ 교통안전시설 확충정비(6개사업 1,450백만원) --- 85%

○ LED 신호등 설치사업(7개교차로 100백만원) --- 완료

○ 사고 잦은곳 구조개선사업(2개소 142백만원) --- 완료

※ 2005년 사고이월 사업(50백만원) 1개소 포함

○ 위치부적정 신호등 이설 및 시설물 집약화(600백만원) -- 95%

□ 금후계획

○ 안전시설 확충 유지관리 사업 --- 2007. 2월까지 완료

※ 도로순찰 및 안전시설물 확충 정비로 시민 불편사항 해소

어린이 보호구역 개선사업

	추 진 배 경
○ 교통약자인 어린이를 안전사고로부터 보호하기 위한 통학로 교통안전시설 확충 및 정비

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2003 ～ 2007(1단계사업)

○ 총사업량 : 중앙초교 외 58개교

○ 총사업비 : 8,871백만원(국비 50%, 시비 50%)

○ 2006 사업량 : 27개교 3,958백만원(국비 1,979, 시비 1,979)

※ 2005 명시이월 1,572백만원(국비 1,979, 시비 780) 포함

□ 추진상황

○ 투자사업비 : 4,681백만원(국비 50%.  시비 50%)

구 분	계	2003년	2004년	2005년
사업량(개소)	30	6	9	15
사업비(백만원)	4,681	1,461	1,020	2,200

○ 2006년 추진상황 : 우전초교 등 10개교 1,792백만원(공정 85%)

□ 금후계획

○ 설계용역 시행(시비 부담금 미확보 지연사업) - 2006. 10~12

- 사업량 : 중인초교 등 17개교  2,166백만원

○ 공사시행 ------------------------- 2006. 12～2007. 5

□ 문제점 및 대책

○ 국비 보조내시분 시비부담금 미확보 : 1,199백만원

➩ 명시이월된 국비 선 집행으로 결산추경에 시비 반드시 확보

전주 경전철 건설 사업

	추 진 배 경
편리하고 안전하게 이용할 친 환경적이며 첨단 기능 시설인 대량수송 교통수단의 조기 구축으로, 지속 증가하는 자동차로 인하여 파생될 교통 불편 요인을 적극 해소하기 위함

□ 사업개요

○ 시스템 및 노선 : 노면 경전철(SLRT)  24.0㎞

- A라인 :14.2㎞(송천역 ～ 팔달로 ~ 장승백이 ~ 삼천농협공판장)

- B라인 :  9.8㎞(전주역 ～ 백제로 ～ 화산로 ～ 평화 3지구)

○ 사 업 비 : 5,050억원(국비 18%, 지방비 22%, 민자 60%)

○ 사업기간 : 1999～2014(16년간)

․A라인건설 : 2009년~2011년 ․B라인건설 : 2012년~2014년

○ 사업추진방식: 수익형 민자사업(BTO, 30년간 운영)

□ 추진상황

○ 경전철 도입 타당성 조사 ------------ 1999. 3~12

○ 기획예산처 예비타당성 조사 --------- 2000. 7~12

○ 전주 경전철 기본계획 용역  ---------- 2002.12~2004. 2

○ 도시철도 기본계획 신청 및 승인․고시 -  2004.  9~2005.10

○ 전주 경전철 기본설계 용역 ---------- 2006. 2. 26

※ 경제성 및 타당성에 대한 우려로 교통수요의 재검토

대중교통계획 용역의 교통수요 결과 검토후 사업 추진여부 결정

□ 금후계획

○ 민자투자사업 지정 신청 및 기본계획(안) 신청 -- 2007. 8~12

○ 민간투자 사업계획서 평가 및 협상대상자 선정 ---- 2008. 1～6

○ 민간투자 협상실시 및 협약체결 ------------- 2008. 7 ～12

○ 실시설계 승인 및 A라인 착공 ------------- 2009. 1~10

○ A라인 완공 및 B라인 착공 --------------- 2011. 12

○ B라인 사업완공 -------------------------- 2014. 6

어린이 교통안전 체험관 운영

	추 진 배 경
○ 어린이들이 생활속의 교통상황에 대한 체험을 통하여 즐기면서 교통법규 준수의 중요성을 인식하고 체질화하도록 지원

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 교통정보센터 내(덕진구 금암동)

○ 규    모 : 150평(5층 60평  옥상층 90평)

○ 개 관 일 : 2006. 3. 15

○ 이용대상 : 유치원생, 초등학교 저학년생

○ 시설내용(1시간 20분 소요)

- 실내체험관 : 드라이빙 시뮬레이터, 3D입체영상관, 교통종합 모형

- 실외실습장 : 교통신호등 체험, 교통안전 표지판 등

- 옥상전망대 : 주요 도로상 교통상황, 휴식용 벤치 비치 등

□ 추진상황

○ 교통안전 체험관 홍보(언론, 어린이집∙유치원 등) - 2006. 1~연중

○ 이용실적(2006. 3. 15～11. 3) - 105개 어린이집 7,000여명

※ 타 자치단체에서 우리시 센터방문 쇄도(수원,여수,청주,충주,원주,남원등)

○ 체험관 운영 전문인력 확보(교통안전관리공단/4명) ---- 2006. 9

□ 금후계획

○ 교통안전 체험관 적극적인 홍보(언론, 어린이집, 유치원, 초등학교 등)

○ 타 도시 교통안전 체험관 벤치마킹 및 운영프로그램 개발

교통신호시스템 효율적 운영 관리

	추 진 배 경
○ 교통신호시스템의 효율적인 유지관리로 교통소통 원할 및 물류비용 절감 ○ 가로별 교통량 변화의 지속적인 조사분석∙데이터구축으로 안정적인 신호 연동체계 구축 및 민간부문 교통정보 제공

□ 사업개요 - 4개사업 540백만원

○ 교통신호 시스템 및 ITS 시설물 유지관리 : 250백만원

- 신호제어기 387, 교통안내전광판 19, CCTV 39개소

○ 리모콘식 시각 장애인 음향신호기 설치(50개소) : 60백만원

○ 교통신호 연동화 개선으로 교통소통 촉진 : 150백만원

- 교통신호체계 기술운영, 교통량 조사 분석, 신호운영 데이터구축

○ 시내버스 정보시스템(BIS) 유지관리 : 80백만원

- 버스안내시스템 134개소, 노변기지국 233개소, 차량단말기 410개

□ 추진상황

○ 신호연동체계 전면 개편(1차) -------------- 2006. 1～4

- 대상 : 백제로 등 13개 가로축 154개 교차로

※ 여행속도 평균 6.3km/h 향상(백제로 통행시간 7분 정도 단축 효과)

○ 교통신호 운영관리 계획수립 및 용역 발주 ------- 2006. 6

○ 최적신호 운영을 위한 관계기관 회의 및 설문조사 - 2006. 9

○ 신호연동체계 추가 개편(2차) ------------- 2006.9~10

- 주요 교차로 교통량 조사 : 100개 교차로중 40개 완료

- 신호연동 데이터(DB) 개선 : 35개소 완료

□ 금후계획

○ 신호연동체계 개편 완료(60개 교차로) ----- 2006. 12

○ 교통시설물 일제 점검 및 보수 ------------- 2006. 12

도 로 과  소 관

ꊱ	남부순환도로 개설 ------------------------	21
ꊲ	전주 진입로 확장 -------------------------	22
ꊳ	대학로 개설관련 전북대시설 지원사업 -------	23
ꊴ	동산고가교 접속도로 확장 -----------------	24
ꊵ	원대한방병원~가련교간 도로개설 ----------	25
ꊶ	한옥마을 테마관광로(은행로)조성 ----------	26
ꊷ	덕진동 법원~동아한일APT간 도로개설 -----	27
ꊸ	세내길(우림교~포스코 간) 도로개설 --------	28
ꊹ	중앙분리대(화단) 설치 --------------------	29
	자전거도로 확충 --------------------------	30
	서남권 국도대체 우회도로 건설 -------------	31
	북부권 국도대체 우회도로 건설 -------------	32
	전주~논산간 고속도로 확장 ----------------	33
	전주~광양간 고속도로 건설 ----------------	34
	익산~전주~장수간 고속도로 건설 ----------	35
	쑥고개 길(국도1호선) 확장 ----------------	36

남 부 순 환 도 로  개 설

	추 진 배 경
○ 서남권 지역의 교통량을 외곽으로 분산시켜 도심교통난 해소 ○ 외곽 도로망 구축으로 주변의 발전 기틀 및 교통편익 제공

□ 사업개요

○ 구    간 : 동서학동 좁은목～서서학동 장승로

○ 사 업 량 : 연장 1,560m,  폭 25～35m

○ 사 업 비 : 36,800백만원 (보상 21,600. 공사 15,200)

○ 사업기간 : 1998 ～ 2008(11개년)

□ 추진상황(전체공정 50%)

○ 공수교～거산황궁ⓐ～무궁화주유소간 공사완료 -- 1998. 1～2005.9

○ 장승로~공수교(150m)간 부분개통 --- 2005.10～2006.5

○ 교대뒤 위험건물(49동)보상 및 철거완료----- 2005.10～2006.10

※ 투자액 : 18,557백만원(기투자 16,557, 2006년 2,000)

□ 금후계획

○ 전일연립주택(가동 15세대) 보상협의 ----- 2006.10～12

○ 전일연립주택~산성천(490m) 보상 및 공사 - 2007. 1～12

전 주 진 입 로  확 장

	추 진 배 경
○ 우리시 관문인 전주진입로 확장으로 쾌적한 도시환경 제공 ○ 미확장 구간 도로확장으로 병목현상 및 교통체증 해소

□ 사업개요

○ 구    간 : 덕진동 원대한방병원～팔복동 BYC

○ 사 업 량 : 연장 1,320m,  폭 35⇒50m

○ 사 업 비 : 17,000백만원 (보상 10,000. 공사 7,000)

○ 사업기간 : 1999 ～ 2007(8개년)

□ 추진상황(전체공정 70%)

○ 원대한방병원～추천대교간 확장개통(710m) - 1999～2003.12

○ 추천대교～동화약품(편측 205m) 확장완료 - 2004. 3~2005. 9

○ 동화약품～BYC(편측 405m) 확장공사중 - 2006. 2～2006.11

※ 투자액 : 11,986백만원(기투자 9,486, 2006년 2,500)

□ 금후계획

○ 동화약품～BYC(서쪽 405m) 도로확장 마무리 -- 2006.11월말

○ 추천대교～BYC(상행선 610m) 보상및공사--- 2007. 1~ 12

대학로개설 관련 전북대시설 지원사업

	추 진 배 경
○ 도시가로망 확충을 위한 대학로개설내 국유지 대체시설지원 ○ 국유지사용 대체시설 협약체결사업으로 행정 신뢰성 제고

□ 사업개요

○ 구    간 : 전북대학교내

○ 사 업 량 : 대운동장 보수 1식, 학군단층축 106평,

동물병원후면 배수Box L=30m(3x2x2련)

○ 사 업 비 : 2,069백만원(21필지 31,470㎡)

○ 사업기간 : 2004～2007(4개년)

□ 추진상황(전체공정 65%)

○ 대학로내 국유지사용 대체시설 협약체결 -- 2003.12.22

- 지원사업 2006년까지 완료할 것임을 협약

○ 학군단 방음벽시설 완료(140백만원) ------- 2004.12.20

○ 대운동장 보수공사 완료(900백만원) ------- 2006. 2~6

※ 투자액 : 1,340백만원(기투자 1,040, 2006년 300)

□ 금후계획

○ 잔여공사(학군단 증축, 배수 BOX) 추진완료 - 2007.3～10

동산고가교 접속도로 확장

	추 진 배 경
○ 동산고가교 접속도로 진,출입부 미확장으로 병목현상 초래 ○ 도로확장으로 교통사고 위험해소는 물론 차량 소통 원활 기여

□ 사업개요

○ 구    간 : 동산동 동산고가교～동산역

○ 사 업 량 : 연장  340m, 폭 18.5 ⇒ 35m

○ 사 업 비 : 2,990백만원 (보상 1,700. 공사 1,290)

○ 사업기간 : 2003 ～ 2007(5개년)

□ 추진상황(전체공정 38%)

○ 상행선(반폭) 확장공사 완료(840백만원) ----- 2005. 3～5

○ 하행선 부분확장 완료(340m중/100m완료) - 2006. 3～5

- 상ㆍ하수도 설치(538m) 및 도로확장 (100m)완료

※ 투자액 : 1,590백만원(기투자 840, 2006년 750)

□ 금후계획

○ 하행선확장구간 암거(L=70m)및 포장부분완료-- 2006.12월말

○ 잔여구간(L=240m) 확장 완료 -------------- 2007.12

원대한방병원~가련교간 도로개설

	추 진 배 경
○ 하가택지개발사업 시행으로 도로기반시설 확충 절대 필요 ○ 북부권과 서남권을 연결하는 주요도로 개설로 교통난 해소

□ 사업개요

○ 구    간 : 덕진동 원대한방병원～가련교간

○ 사 업 량 : 연장 1,250m,  폭 35m

○ 사 업 비 : 27,000백만원  (보상 10,000, 공사 17,000)

○ 사업기간 : 2005 ～ 2008(4개년)

※하가택지13만평(토지공사)----------‘05.8.9～08.2월말

□ 추진상황(전체공정 76%)

○ 실시설계완료 및 도시계획 변경결정(광장축소) ---- 2003.11～2005.8

○ 편입토지 보상(5필지/3,948㎡) ------- 2005. 8～12

○ 공사발주 및 착공(택지개발 중복구간 L=300m) - 2006. 5. 12～현재

- 전체분(10,358백만원), 1차분(656백만원)

※ 투자액 : 2,060백만원(기투자 1,060, 2006년 1,000)

□ 금후계획

○ 원대한방병원~하가택지 경계(950m) 보상추진 - 2007. 1～ 4

○ 대절토부 절취 및 택지개발지구 성토 ------ 2007. 5～12

○ 전체구간 도로개설완료 ------------------- 2008. 1～ 6

한옥마을 테마관광로(은행로)조성

	추 진 배 경
○ 한옥마을을 찾는 국내외 관광객들의 안전한 보행권 확보 ○ 가장 한국적인 전통문화 이미지를 반영 관광명소로 부각

□ 사업개요

○ 구    간 : 교동 남천교～동부시장

○ 사 업 량 : 연장 980m,  폭 8 ⇒ 12m

○ 사 업 비 : 9,500백만원(보상4,500  공사5,000)

○ 사업기간 : 2005 ～ 2007(3개년)

□ 추진상황(전체공정 34%)

○ 도시계획변경결정(폭15⇒12m) ------------ 2005.8

○ 분할측량 및 보상추진(L=400m/2,000백만원) --- 2005.9～12

○ 실시설계 주민설명 및 의견수렴(양방통행) ---- 2006.1.11

○ 착공 및 이주건물철거(대상30/25동완료) ----- 2006.4～현재

○ 미협의자(5세대)토지수용신청 및 재결 -- 2006.9.4～ 11월말

※ 투자액 : 9,500백만원(기투자 2,200, 2006년 7,300)

□ 금후계획

○ 보상금 공탁 및 행정대집행 --------------- 2006.12월말

○ 지장물 철거 및 공사완료------------------ 2007. 1~12

덕진동 법원~동아한일APT간 도로개설

	추 진 배 경
○ 구도심과 신시가지 연결교량가설로 지역경제 활성화 ○ 덕진․서신동일대 도심교통난해소 및 낙후지역 균형발전도모

□ 사업개요

○ 구    간 : 덕진동 법원～서신동 동아한일APT

○ 사 업 량 : 연장 248m, 폭 25m(교량 118m, 도로 130m)

○ 사 업 비 : 11,000백만원 (보상3,000  교량및도로공사 8,000 )

○ 사업기간 : 2004 ～ 2007(4개년)

□ 추진상황(전체공정 80%)

○ 롯데백화점 입점에 따른 도로개설 협약체결 ---- 2004. 5.14

○ 교량가설착공및준공(접속도로 미완료) ----- 2005.3～2006.4

○ 도로선형변경 및 실시계획인가(도로부분)-- 2006. 3～6

○ 미협의자(4세대)토지수용신청및재결 ----- 2006.9.4～11월말

※ 투자액 : 11,000백만원(기투자 민자 8,000, 2006년 시비 3,000)

□ 금후계획

○ 보상금 공탁 및 행정대집행 --------------- 2006.12월말    ○ 지장물 철거 및 접속도로 개설 마무리 ------ 2007. 1～5

세내길(우림교~포스코간)도로개설

	추 진 배 경
○ 대단위 신축아파트 밀집지역의 진출입로 미개설로 교통체증 심각 - 아파트 1,918세대가 05. 9월～ 07.5 입주 완료 ○ 서부신시가지와 연계되는 주요 노선으로 도로개설이 시급함

□ 사업개요

○ 구    간 : 효자동 우림교～포스코간

○ 사 업 량 : 연장 350m,  폭 25m

○ 사 업 비 : 4,700백만원(보상 1,600, 공사 3,100)

○ 사업기간 : 2006～2007(2개년)

※ 전체구간(우림교～이동교 L=1,050m)

□ 추진상황(전체공정 10.6%)

○ 우림교～포스코앞(L=700m) 개설 --- 2003.1～2005.12

○ 분할측량 및 실시설계용역착수 ------- 2006.2～2006. 5

○ 보상협의추진완료(토지5필지) -------- 2006.3～2006. 8

※ 투자액 : 500백만원(2006년 500)

□ 금후계획

○ 실시설계용역 완료  ------------------------- 2007. 3.18

○ 지장물 보상 및 공사 추진 ------------------ 2007.1～ 7

중앙 분리대(화단) 설치

	추 진 배 경
○ 중앙선 침범과 무단횡단으로 인한 교통사고를 사전에 방지하고 안전한 차량 통행으로 녹색 환경도시 건설

□ 사업개요

○ 대    상 : 교통사고가 잦은 주요간선도로(4차선도로)

○ 사 업 량 : 49개노선  68.9km

○ 사 업 비 : 15,000백만원(국비 7,500,  시비 7,500)

○ 사업기간 : 2002 ~ 2011(10개년)

□ 추진상황

○ 중앙분리대 정비계획 수립 ------------ 2003. 6

○ 사 업 량 : 13개노선 21.5km

- 화단형 13.2   - 방호형 4.0   - 수벽 4.3

○ 사 업 비 : 6,525백만원(국 3,041  시 3,484)

□ 금후계획 ----- 444백만원

○ 사 업 량 : L=2.4㎞(월드컵로 서곡광장～호남제일문)

- 한전 지중화사업과 병행 추진 : 공정 70%

○ 사업시행 : 2006. 4 ～ 12월

- 경계석 설치 및 화단 성토를 우선 추진하고, 조경식재는

2007년도 천년전주 푸른도시 가꾸기 사업으로 시행

자전거 도로 확충

	추 진 배 경
○ 자전거도로 확충으로 자전거 이용 활성화를 통한 건강한 여가활동 도모 및 교통정체 완화

□ 사업개요

○ 사업규모 : 4개 생활권역 L=325㎞

○ 사 업 비 : 32,500백만원

○ 사업기간 : 1997 ~ 2010년

□ 추진상황

○ 사 업 량 : 280㎞(86%)

○ 사 업 비 : 30,768백만원(예산 17,668  비예산 13,100)

※ 비예산 ― 지하매설물 굴착복구 원인자 부담

○ 사업위치 : 시내일원 기존보도 및 하천 둔치 ․ 제방 등

※ 나머지 45㎞는 미개설 도시계획 도로로서 도로개설과 병행

추진

□ 금후계획 ― 레저스포츠 및 출퇴근용

○ 삼천교 상류 우안 제방도로 2.4km ------------- 600백만원

○ 완주공단 진입로 자전거도로 3.5km 마무리 추진 -- 240백만원

서남권 국도대체 우회도로 건설

〈계속 ․ 국가사업〉

	추 진 배 경
○ 시가지를 통과하는 국도1호, 17호, 27호선과 지방도 712호, 716호, 749호선의 교통량을 분산하여 시내권 교통정체 해소 ○ 서남부지역 원활한 물동량 이동의 중심기능을 강화함으로써 지역개발 촉진 및 광역도시 발전기반 구축

□ 사업개요

○ 구    간 : 완주군 상관 ∼ 구이 ∼ 이서 ∼ 용정 ∼ 익산시 춘포

- 완공계획 : 구이∼용정(2006년), 용정∼춘포(2010년)

○ 사업규모 : 33.4km(폭 20m) ※ 전주시 구간 13.4㎞

○ 사 업 비 : 4,646억원(국비 4,368, 시비 278)

○ 사업기간 : 1998 ∼ 2010년(13년)

○ 시 행 청 : 익산지방국토관리청(보상 : 전주시)

□ 추진상황(전체공정 81%)

○ 상관 ∼ 구이간(L=8.9㎞)개통 --- 2005. 4. 20

○ 구이 ~ 춘포간(L=24.5km) ----- 보상 및 공사 추진중

○ 공사구간 총 보상실적 ------------ 777필지 254,695평(86%)

※ 투자액 : 3,782억원(시비 240억원 - 기투자 215, 2006년 25 포함)

□ 금후계획

○ 이서 ～ 춘포구간 보상 : 135필지 223,183㎡(67,516평)

북부권 국도대체 우회도로 건설

〈계속 ․ 국가사업〉

	추 진 배 경
○ 시가지를 통과하는 국도17호, 27호선 교통량을 분산하여 시내권 교통정체 해소 ○ 북동부지역 원활한 물동량 이동의 중심기능을 강화함으로써 지역개발 촉진 및 광역도시 발전기반 구축

□ 사업개요

○ 사업구간 : 조촌 용정∼아중역(1단계)∼동서학동 색장리(2단계)

- 1단계 : 2003 ∼ 2011년(9년)

- 2단계 : 2020년까지(전주~광양간고속도로 교통수요 예측 후 개설)

○ 사업규모 : L = 18.6km,  B = 20m(전주시 구간 : 11.77㎞)

○ 사 업 비 : 3,040억원 (국비 2,790, 시비 250)

○ 사업기간 : 2003년 ～ 2011년(9개년)

○ 시 행 청 : 익산지방국토관리청(보상 : 전주시)

□ 추진상황

○ 용정~용진 대안입찰 완료 및 업체선정 - 2005.12.22~2006.5.30

- 시공사 : (주)대우건설(40%), SK건설(20%), 도내업체(40%)

○ 공사계약 및 교량 구조물 공사 추진 - 2006. 6. 28~

○ 하천점용허가 취소(교량가설 예정지) - 22필지 11,436㎡(2006.9.7)

○ 편입용지 분할측량 완료 - 977필지 634,707㎡(2006.9.29)

- 국유지 : 407필지 168,896㎡, 사유지 : 570필지 465,811㎡

○ 토지분할 신청(시⇒덕진구) --------- 2006. 10. 28

○ 토지주 개별통지 ------------------- 2006. 10. 30

□ 금후계획

○ 편입토지 물건(지장물, 실농) 조사 -- 2006.11.10~12.31

○ 편입토지 및 물건 보상 ------------- 2007. 1~4

- 교량가설 예정지 및 연약지반지역 우선 용지보상 추진

87필지 270,000㎡(50억원 정도 소요)

전주∼논산간 고속도로 확장

〈계속 ․ 국가사업〉

	추 진 배 경
○ 천안∼논산간 고속도로 개통에 따른 교통정체 해소 ○ 논산∼전주간, 전주∼광양간, 익산∼장수간 고속도로 연결로 물류비용 절감 ○ 행정수도 연계 교통망 구축으로 지역균형발전의 활성화 도모

□ 사업개요

○ 구    간 : 삼례 ∼ 논산간

○ 사업규모 : 연장 17.0km, 폭 4차로 ⇒ 6∼8차로

○ 사 업 비 : 3,500억원 (국비)

○ 사업기간 : 2002 ∼ 2008 (7개년)

○ 시행기관 : 건설교통부(한국도로공사)

□ 추진상황

○ 기본 및 실시설계 완료 (66억원) ----- 2002. 8∼2004. 10

○ 공사발주 및 착공 ------------------- 2005.12.27

※ 우선 삼례∼논산간 구간 발주, 전주∼삼례간은 현재 추진중인

익산∼장수간, 전주∼광양간 고속도로 개통후 통행량 추이를

검토하여 시행여부 결정

○ 2006년도 사업비 : 250억원

□ 금후계획

○ 편입용지 보상 및 공사 추진중

※ 준공예정 : 2010년(2005년 착공, 절대공기 부족으로 공기연장 불가피)

전주∼광양간 고속도로 건설

〈계속 ․ 국가사업〉

	추 진 배 경
○ 군장산업단지와 광양만 산업단지의 연결도로망 구축 시급 ○ 호남고속도로 및 익산∼장수간 고속도로의 연결로 고속도로 이용율 제고 및 산업경쟁력 증진

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주 ∼ 광양간

○ 사업규모 : 연장 117.8km(전북구간 72.7Km, 전주시 구간 7.78㎞)

○ 사 업 비 : 28,231억원(국비)

○ 사업기간 : 2003 ∼ 2011(8개년)

○ 시 행 청 : 건설교통부(한국도로공사)

□ 추진상황(전체공정 19%) ------ 1,443억원(국비)

○ 기본 및 실시설계․환경영향평가 등 행정절차 완료 - 2003.12

○ 도로구역 결정고시 ------------------------- 2004. 9

○ 전주～임실구간(37.89㎞) 공사착공 --------- 2004.12.30

○ 7-8공구(임실～광양) 착공 ----------------- 2005.3.31

○ 용지 보상 및 도로 축조공사 추진

□ 2007년 계획 -------------------- 2,747억원(국비)

○ 편입용지 보상 및 도로 축조공사

□ 문제점 및 대책

○ 우아동 삼거마을 주민민원 발생

- 성토로 계획된 구간 L=460m를 고가교로 시설 요구

○ 총 사업비 범위내에서 최대한 주민의견 수렴계획(도로공사)

※ 준공예정 : 2010년(계획년도보다 1년 조기완공 : 광양만 배후도로망 구축)

익산∼전주∼장수간 고속도로 건설

〈계속 ․ 국가사업〉

	추 진 배 경
○ 군․장 산업단지 등 서해안 공업지대와 동․남해안 공업지대를 연결하는 도로망 구축으로 물류비용 절감

□ 사업개요

○ 위    치 : 익산 ∼ 전주 ∼ 장수간

○ 사업규모 : 연장 61km 폭 4차로

○ 사 업 비 : 11,347억원 (국비)

○ 사업기간 : 2001 ∼ 2008 (8개년)

○ 시 행 청 : 건설교통부(한국도로공사)

□ 추진상황(전체공정 80%) -------- 6,900억원(국비)

○ 용지보상 완료

○ 도로축조 및 구조물 시공 (공정율 80%)

○ 건축공사 등 기타공사 시행중

□ 금후계획 ------------------- 4,447억원(국비)

○ 편입용지 보상 및 도로축조공사 추진

※ 준공예정 : 2007.12월말 (계획년도 보다 1년정도 조기준공)

쑥고개길(국도1호선) 확장

〈신규 ․ 국가사업〉

	추 진 배 경
○ 도심을 통과하는 시관리 국도 1호선 확장으로 교통정체 해소 ○ 서부지역 신흥 개발권과 구도심권의 연결 교통망 확장으로 지역간 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 위    치 : 우림교 ∼ 안행교 사거리

○ 사업규모 : 연장 0.63km, 폭 25m ➩ 35m

○ 사 업 비 : 70억원 (국비)

○ 사업기간 : 2005 ∼ 2008(4개년)

○ 시행기관 : 건설교통부(대한주택공사)

□ 추진상황

○ 실시설계 용역발주 -------------------- 2005.7∼2006.2

○ 도시계획시설사업 실시계획 승인 ---------- 2006. 5.18

□ 금후계획 --------------------- 15억원(국비)

○ 편입용지 보상 개시 -------------------- 2006. 12월

○ 공 사 착 공 --------------------------- 2007. 8월

○ 년차별 투자사업비 확보

- 2007년도 : 40억원, 2008년도 : 25억원

○ 도시계획시설사업 준공 및 기부체납 ---- 2008. 12월말

재난안전관리과 소관

ꊱ	비상대비 민방위 업무추진 -----------------------	38
ꊲ	자연․인적 재난방재 업무추진 -------------------	39
ꊳ	2005 수해복구사업추진 ------------------------	40
ꊴ	전주천 자연형하천 정화사업 ------------------------	41
ꊵ	삼천 자연형 하천 조성사업 -------------------------	42
ꊶ	만경강 생태하천 가꾸기사업 ------------------------	43
ꊷ	만경강 수계치수 중복천 개수공사 ------------------	44
ꊸ	아중천 생태하천조성 및 준설사업 ----------------	45
ꊹ	덕진보 상류 수질오염 방지사업 ---------------------	46

비상대비 민방위 업무 추진

	추 진 배 경
○ 유사시 비상대비 역량을 강화하고 평시 실생활에 도움이 되는 민방위 교육훈련 실시 ○ 민방위 시설장비 확충및 철저한 관리로 비상대비태세 강화

□ 현    황

○ 민방위 훈련 : 연8회(민방공 대피훈련 3, 방재훈련 5)

○ 민방위 교육대상 : 70,673명

- 지역대 : 1,375개대 64,039명, 직장대 : 112개대 6,634명

- 민방위교육 1-4년차 연/4시간, 5년차이상 비상소집훈련 1시간

○ 민방위 시설 : 37개소(비상급수시설 10, 대피시설 12, 경보시설 15)

○ 민방위 장비 : 방독면  45,656개, 메가폰․구급약품 등 8,189조

□ 추진상황

○ 민방위 비상소집 ----------------- 2회(1,8월)

○ 민방위 시설장비 지도점검(3회) --- 2006. 3, 6, 10월

○ 민방위의 날 대피훈련(3회) ------- 2006. 4, 8, 10월

○ 마을단위 시범방재훈련(2회) ------ 2006. 5. 15, 6. 15

○ 민방위대원 상반기 교육훈련(70,673명) - 2006. 6. 30

○ 2006 을지/포커스렌즈 연습실시(5일간) - 2006. 8. 17~8. 23

○ 2006 화랑훈련 실시 ---------------- 2006. 10. 23~27(5일간)

○ 2006 인력동원 훈련실시(20명) ----- 2006. 10. 30

○ 2006 중점관리자원 확인의 날 행사(2회) - 2006. 5월, 11월

□ 금후계획

○ 민방위의 날 방재훈련 ---------------- 2006. 11

자연․인적 재난방재 업무추진

	추 진 배 경
○ 사전 예방위주의 업무추진으로 시민의 생명과 재산보호 ○ 호우․태풍 등 자연재난과 각종 인적재난으로부터 대응태세 완비

□ 현    황

○ 특정관리대상시설

구 분	총 계	중점관관리대상시설				재난위험시설 D등급
		소계	A등급	B등급	C등급
합 계	1,272	1,258	1,146	67	45	14
건축물	1,245	1,232	1,138	58	36	13
시설물	27	26	8	9	9	1

○ 재난기금 관리현황

(단위 : 백만원)

구 분	‘05년까지 적립금액	‘06년 조성액	‘06년 사용액	현보유액
재난관리기금	5,656	502	720	5,438

□ 추진상황

○ 2006년도 재난안전관리계획 수립   ------  2006. 1. 25

○ 해빙기 방재위험시설물 정비(8개소 720백만원) - 2006. 6. 30

○ 여름철 재난종합 상황실 운영  --- 5.15 ~ 10.15(5개월)

○ 수방자재 확보 ----- 포대류, 묶음줄, 말목, 비닐, 덮개 등

○ 상황실 방재장비 시스템 구축 -- CCTV 5대, 강우량계 5개소 등

○ 양수기 침수위험지역 배치 ---- 총111대(완산56, 덕진55)

□ 금후계획

○ 방재위험 시설물 및 특정관리대상 시설물 정기 점검 강화

○ 재난종합상황실 현대화 및 재난관리 시스템 구축

2005 수해복구 사업 추진

	추진목표
○ 피해원인을 면밀히 조사 분석하여 완벽한 개량복구 추진 ○ 자연환경 및 주변여건을 고려한 친환경적 시설물로 복구

□ 복구계획

○ 재원현황

(단위 : 백만원)

구 분	총복구액	국 비	도 비	시 비	자부담	자체복구
계	25,291	17,651	2,951	3,957	592	140
사유시설	1,826	1,078	66	90	592	-
공공시설	23,465	16,573	2,885	3,867	-	140

○ 공공시설 현황

(단위 : 개소, 백만원)

구 분	합 계	도 로	하 천	상하수도	수리시설	사방임도	기 타
수 량	107	7	24	4	19	12	41
복구액	23,465	1,906	11,191	2,071	2,735	1,650	3,912

□ 그동안 추진상황

○ 주    택 : 17동중 완공 10, 포기 7 ------------ 100%

○ 농 경 지 : 70.4ha중 70.4ha 복구완료 -------- 100%

○ 공공시설 : 107건중 완료 98, 공사중 9 ------------ 92%

□ 금후계획

○ 중규모 중인천(20억) 복구완료(공정95%) --- 2006.11

○ 금산사선(3개선) 복구완료(95%) ------------ 2006.12

○ 대규모 독배천(교량4건포함 76억)복구완료(공정10%) - 2007. 6

○ 덕진동 법원앞 침수지역 : 배수암거 설치완료 , 덕진보개량 용역 추진중

○ 팔복동 야전마을 침수지역 : 배수펌프 설치완료, 우수관거 정비방안 검토중

전주천 자연형하천 정화사업

	추 진 배 경
○ 성공적으로 조성되어 전국적 벤치마킹의 사례가 되고 있음 ○ 수질개선 및 생태환경을 추가 보완하여 완벽한 하천으로 재조성

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 교동 남고보 ～ 덕진동 삼천합류점

○ 사업규모 : 어도개량 설치 3개소, 징검여울 조성 8개소 등

○ 총사업비 : 1,359백만원(국비 894, 시비 465)

○ 사업기간 : 2005. 4 ～ 2007. 5(3개년)

□ 추진상황

○ 1차 자연형하천 조성사업 완공 ------------ 2002. 12. 27

○ 2차 자연형하천 정화사업 실시설계용역 착수 - 2005. 4. 28

○ 실시설계 및 설계심의 등 행정절차 완료 --- 2006. 3. 31

○ 공 사 착 공 ------------------------------ 2006. 5. 11

- 징검여울조성 8개소 완료, 어도개량 3개소 추진(공정 55%)

※ 투자액(100%) : 1,359백만원(기투자 575, 2006년 784)

□ 금후계획

○ 어도개량 완료 -------------------------- 2006. 11

○ 사 업 완 공 ---------------------------- 2006. 12. 30

삼천 자연형하천 조성사업

	추 진 배 경
○ 서부지역의 급속한 도시발전으로 삼천 이용객의 급증 ○ 수질개선과 생태계 복원 및 각종 편익시설 확대설치 필요

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 삼천동 삼천교 ～ 팔복동 추천대교

○ 사업규모 : L = 8.05km

○ 총사업비 : 12,441백만원(국비 7,553, 시비 4,888)

○ 사업기간 : 2001 ～ 2007(7개년)

□ 추진상황(전체공정 90%)

○ 기본 및 실시설계 완료 ----------------- 2001. 10. 15

○ 공사 착공 ----------------------------- 2001. 12. 31

- 자연형 호안 3.7km, 차집관거 1.6km, 자전거도로 9.7km

- 수질정화습지 1, 다목적행사광장 1, 징검다리 4개소 등

- 휴게소 및 체육시설 19, 진입계단 12, 진출입로 22개소 등

※ 투자액(100%) : 12,441백만원(기투자 10,629, 2006년 1,812)

□ 금후계획

○ 진입계단 1개소, 진ㆍ출입로 4개소 ---------- 2006. 12

○ 어도 2, 여울 1개소 ------------------------- 2006. 12

○ 기타 부대시설 등 사업완공 ------------------ 2007. 4

만경강 생태하천 가꾸기 사업

	추 진 배 경
○ 오염된 전주천 하류의 수질개선 및 하천생태계를 복원 ○ 전주천, 삼천과 더불어 시민에게 쾌적한 휴식공간을 제공

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 팔복동 추천대교 ～ 만경강 합류부

○ 사업규모 : L= 7.9km(전주천 5.7km, 만경강 2.2km)

○ 총사업비 : 16,637백만원(국 10,772. 도 598. 시 5,267)

○ 사업기간 : 2001 ～ 2010(10개년)

□ 추진상황(전체공정 32%)

○ 기본계획 연구 및 기본설계 ------------- 2001.  4. 24

○ 하천개수 사업 완료(1.9km) ----------- 2003. 12. 31

○ 만경강 생태하천 가꾸기 사업 공사 착공 - 2004. 11. 25

- 1차분(완료) : 조경석쌓기 2.36km, 산책로겸 자전거도로 8.76km 등

- 2차분(완료) : 조경석쌓기 0.24km, 수제설치 5개소 등

- 3차분(공정 80%) : 조경석 쌓기 0.57km, 수제설치 8, 건널목교 1개소 등

※ 투자액(31%) : 5,163백만원(기투자 4,544, 2006년 619)

□ 금후계획

○ 자전거도로 0.4km, 건널목교 1개소 --------- 2006. 12

○ 사 업 완 공 -------------------------------- 2010. 12

만경강수계치수 중복천개수공사

	추 진 배 경
○ 익산지방국토관리청 만경강수계치수 사업으로 선정 위ㆍ수탁 추진 ○ 재해 예방과 친환경적인 생태하천으로 조성 시민휴식공간 제공

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 삼천동 쑥고개길 ～ 효자동 삼천합류점

○ 사업규모 : 용지매입 및 하천개수 L=3.5㎞

○ 총사업비 : 32,000백만원(전액국비)

○ 사업기간 : 2004 ～ 2010(7개년)

□ 추진상황(전체공정 10%)

○ 위․수탁공사 협약 체결(익산청⇔전주시) -- 2003. 6. 9

○ 하천정비시행계획 고시 ------------------- 2005. 8. 2

○ 토지 및 지장물보상 협의 착수 ------------ 2005. 8.20

○ 공사 총괄계약 및 1차분 공사 착공 -------- 2005.10.21

- 1차분 공사준공 ------------------------- 2006.10.30

※ 투자액(10%) : 3,200백만원(기투자 1,200, 2006년 2,000)

□ 금후계획

○ 2차분 공사 추진 ----------------------- 2007. 1~12

※ 예산확보계획 3,800백만원(국비)

○ 전체사업 준공 ------------------------- 2010.12

아중천 생태하천조성 및 준설사업

	추 진 배 경
○ 도심하천인 아중천에 대하여 수질개선및 하천정비 시행 ○ 재해사전 예방및 하천생태 환경을 복원하여 시민휴식공간 제공

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 우아동 아중저수지 ～ 소양천합류부

○ 사업규모 : L= 2.88㎞

○ 총사업비 : 4,400백만원(국 2,600, 도 900, 시 900)

○ 사업기간 : 2004 ～ 2008(5개년)

□ 추진상황

○ 2004년도 예산확보 : 330백만원(국비 200, 도비 60, 시비 70)

- 실시설계용역(140백만원)

- 1차공사 추진(190백만원) 식생호안블럭 설치 L=0.5km

○ 2006년도 예산확보 : 1,000백만원(국비 600, 도비 20, 시비 20)

- 총괄공사 계약 -------------------------- 2006. 9. 7

- 사업내용 : 자연형 호안정비 2.88km, 인도교설치 2개소, 보설치 5개소

산책로 설치 2.5km, 징검다리 6개소, 초화류식생 등

○ 금차분 공사 착공 ------------------------ 2006. 9. 8

- 교량 1기(우정신세계앞), 징검다리 및 여울 4개소, 저수호안공 1,975m

□ 금후계획

○ 금차분 공사 완료 ------------------------- 2006. 12

○ 2차분 공사 추진 -------------------------- 2007. 1~12

※ 예산확보계획 1,000백만원(국비 600, 도비 20, 시비 20)

○ 전체 공사 완료 --------------------------- 2008. 12

전주천․삼천 수질개선사업

	추 진 배 경
○ 보상류 하상구조상 초기우수 유입 퇴적으로 오염, 악취등 민원발생 ○ 매년 봄철(4~5월) 부영양화 등 물고기 폐사사고 반복발생

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진동 명성@앞, 삼천동 강변@앞

○ 시설규모 : 덕진보(H=3.1m, L=88.4m), 이수보(H=3.5m, L=150m)

○ 총사업비 : 4,100백만원(시비)

○ 사업기간 : 2006 ～ 2009(4개년)

□ 추진상황

○ 덕진보상류 준설관련 관계․전문가 자문회의 개최 ------- 2005. 3

○ 덕진보 오니토 준설작업 시행 --------------------- 2005. 5

○ 하가지구 개발로 용도폐지되는 덕진보개량 용역 추진 --- 2006. 1

※ 삼천 이수보 개량 용역 동시 추진(서부신시가지 개발)

○ 상.하류의 생물조사,물리,화학,생태적 하천조사(1차) - 2006. 4

○ 용역 중간보고회 개최(1차)  --------------------- 2006. 5

○ 생물조사 등 생태적 하천조사(2차) --------------- 2006. 6

○ 철거 및 개량에 따른 하상 변동 예측 모의실험 --- 2006. 10

※ 투자액(12%) : 500백만원(기투자 200, 2006년 300)

□ 금후계획

○ 전문가 등 자문회의 개최(공법선정) -------------- 2006. 11

○ 실시설계 완료 -------------------------------- 2006.12

○ 공 사 착 공 ---------------------------------- 2007. 3

○ 사 업 완 공 ---------------------------------- 2008.12

하수관리과 소관

ꊱ	하수도 공기업 특별회계 운영 --------------------	48
ꊲ	하수처리장 기존 1,2단계 고도처리사업 ----------	49
ꊳ	하수슬러지 처리시설 설치사업 -------------------	50
ꊴ	하수관거정비 민간투자(BTL)사업 ---------------	51
ꊵ	화산․덕진처리구역 하수관거 정비사업 -----------	52
ꊶ	동서학동(원당․객사) 차집관거 설치사업 -----------------	53
ꊷ	송천동 (붓내마을)3단계 차집관거 증설사업 -------	54
ꊸ	전주시 하수도 정비 기본계획 변경 용역 ----------	55
ꊹ	하수처리장 민간위탁관리 -----------------------	56

하수도 공기업 특별회계 운영

□ 세입․세출 예산편성 현황

○ 세 입                                   (단위 : 백만원)

합 계	영 업 수 익	영업외 수 익	국 고 보조금	도 비 보조금	기타건설 보 조 금	원인자 부담금	예산외 계 정
37,083	12,706	2,668	6,925	210	3,209	4,250	7,115

○ 세 출                                   (단위 : 백만원)

합 계	영 업 비 용	영업외 비 용	특 별 손 실	가 동 설비자산	비 가 동 설비자산	부 채 상 환	반환금	예비비
37,083	9,001	526	165	9,684	12,943	1,589	2,872	303

□ 지방채 상환계획

종 류	발행총액	발 행 조 건		기상환액	미상환액	상환기간
		이율	상환기간
합 계	18,255			10,353	7,902
송천 하수 간선	1,040	4.5％	5년거치 10년상환	800	240	‘03～’08
2단계 하수처리장	14,198	변동금리	〃	6,746	7,452	‘01～’11
슬러지 처리 시설	3,017	변동금리	〃	2,807	210	‘09～’19

○ 송천하수간선(전라북도 지역개발기금) --------- 자체상환

○ 2단계 하수처리장(재경부 공공자금관리기금) - 도비50％.시 일반회계50％

○ 슬러지처리시설(환경관리공단 환특자금) ----- 국비100％상환

□ 금후계획

○ 2005년도 하수도특별회계 결산 결과 2,554백만원 손실발생

○ 현실화율이 48,09％로 하수도사용료 단계별 요금인상 검토

하수처리장 기존1,2단계 고도처리사업

	추 진 배 경
○ 하수도법 개정으로 강화된 수질기준에 맞게 기존시설 개량 ○ 하수처리장 시설개선으로 만경강등 새만금유역 수질개선 도모

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 송천동2가 1035번지 환경사업소내

○ 사업규모 : 303천톤/일, 고도처리공법개선(표준활성법 → CNR공법)

○ 사 업 비 : 60,000백만원(국 30,000, 도 15,000, 시 15,000)

○ 사업기간 : 2002. 3 ～ 2007. 4(6개년)

□ 추진상황(전체공정 89%)

○ 고도처리공사 착공 ----------------------- 2004.10.24

○ 공동구 및 방류펌프장 구조물공사 완료 ---- 2005.10.30

○ 수처리 공정 완료 ------------------------ 2006.10.14

○ 처리시설 성능 운전 ---------------------- 2006.10.15

□ 금후계획

○ 전기, 기계, 계장공사 완료 ----------------- 2006. 11

○ 조경, 건축, 포장공사 등 부대시설 완료  ---- 2007. 4

○ 시운전 및 사업 준공 ----------------------- 2007. 6

하수슬러지 처리시설 설치사업

	추 진 배 경
○ 2012년부터 해양투기 금지예정에 따른 대책 마련 ○ 안정적 처리시설 확충으로 악취를 줄이고 시민보건위생 향상

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 송천동2가 환경사업소내(예정)

○ 사업규모 : 슬러지처리 150톤/일(현재 해양투기 110톤/일)

○ 사업기간 : 2003 ～ 2010(8개년)

○ 사 업 비 : 14,000백만원(국 7,000, 도 3,500, 시 3,500)

□ 추진상황

○ 환경부 대상사업 확정 ----------------------- 2002.11. 8

○ 기본 및 실시설계 용역 착수 ----------------- 2003. 9. 1

○ 인근마을 민원발생으로 용역 중지(60%) ------ 2004.12. 6

□ 금후계획

○ 인근주민대표 등. 국내․외 선진지 견학실시 ---- 2006. 12

○ 중지된 기본 및 실시설계 용역 재착수 -------- 2007.  2

○ 사 업 착 공 -------------------------------- 2007. 12

○ 사 업 준 공 -------------------------------- 2010. 12

하수관거정비 민간투자(BTL)사업

	추 진 배 경
○ 민간자본 유치로 지역경기를 활성화 하고 정화조 폐쇄로 시민부담 경감 ○ 오수관거 정비로 하천 수질개선 및 불명수를 차단 하수처리비 절감

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 일원(덕진, 아중, 중앙, 화산, 효자 처리구)

○ 사 업 량 : 하수관거 정비(우․오수 분리) L = 127Km

○ 사 업 비 : 107,361백만원(민간자본)

○ 사업기간 : 2005 ～ 2010(6개년)

□ 추진상황

○ 업무 위․수탁 협약체결(환경부, 도, 시, 환경관리공단) - 2005. 6. 9

○ 시설사업 기본계획고시(민투법 제8조, 10조) - 2005. 6.17

○ 시의회 의무부담행위 동의안 의결 ----------- 2005. 9. 9

○ 민간사업자 사업계획서 평가 및 우선협상대상자 선정 - 2005.10.13

○ 협상 및 사업시행자 지정(전주□랫물길(주)) -  2006. 4. 9

○ 우선시공분 시설사업 실시계획 승인 및 착공 ---- 2006. 4.25

□ 금후계획

○ 본 공사에 대한 시설사업 실시계획 승인 및 착공 - 2007. 1

○ 성과보증(13개월) 및 공사 준공 -------------- 2010. 12

○ 사업시행자 관리운영(20년간)   -------------- 2030. 12

화산․덕진처리구역 하수관거 정비사업

	추 진 배 경
○ 하수관거 우․오수 분리를 통하여 민간위탁중인 하수처리비 절감 ○ 전주천, 삼천 수질개선과 건물 정화조 폐쇄로 시민 보건위생 향상

□ 사업개요

○ 위    치 : 화산처리구역 1․4․7분구, 덕진처리구역 1분구

○ 사업규모 : 우․오수관 분리등 관거정비 70㎞

○ 사업기간 : 2004 ～ 2008 (5개년)

○ 사 업 비 : 39,728백만원(국 19,583,  시 20,145)

□ 추진상황(전체공정 60%)

○ 1차분(동서학동 산성천 부근) L= 8.3Km 공사완료 --- 2005. 7. 14

○ 2차분(덕진동 호반촌 부근) L= 2.9Km 공사완료  --  2005. 9.  9

○ 3차분(대학병원, 금평초교) 착수 ------------- 2005. 4. 9

- 계획연장 L= 24.1Km 중 22.7Km 완료(공정 94％)

○ 4차분(효자택지, 서신2택지) 착수 ------------ 2006. 5. 4

- 계획연장 L= 24.5Km 중 6.6Km 완료(공정 27％)

□ 금후계획

○ 3차분(L = 24.1Km) 공사완료 --------------- 2006. 12

○ 잔여분(L = 10.2Km) 착수 ------------------- 2007.  6

○ 4차분(L = 24.5Km) 공사완료 --------------- 2007. 10

○ 사업준공 -------------------------------------- 2008. 12

동서학동(원당․객사) 차집관거 설치사업

	추 진 배 경
○ 상류 농촌동 지역 발생 오수를 관거설치 차집처리 전주천 수질개선 ○ 정화조 폐쇄 차집관거에 직접 연결 시민 보건위생 향상

□ 사업개요

○ 위    치 : 농촌동 3개마을(동서학동 내원당, 외원당, 객사)

○ 사업규모 : 하수관거 정비 L=8.5㎞

○ 사업기간 : 2004 ～ 2008 (5개년)

○ 사 업 비 : 3,364백만원(국 1,682,  도 841,  시 841)

□ 추진상황(전체공정 30%)

○ 사업계획 확정 통보(환경부) ----------------- 2004.12. 7

○ 기본계획 및 실시설계 용역완료 -------------- 2005. 9. 12

○ 1차분 완료(동서학동 객사마을 L=1.5km) - 2006. 8. 7

○ 2차분 착공(동서학동 객사마을 L=1.4km) - 2006. 6.28

□ 금후계획

○ 2차분(객사마을) L=1.4km 준공 ------------ 2006. 12

○ 3차분(내원당․외원당마을)착수--------------- 2007.  3

- 계획연장 L = 5.6Km

○ 사업준공 ----------------------------------- 2008. 12

송천동(붓내마을) 3단계 차집관거 증설사업

	추 진 배 경
○ 상류지역 급속한 개발로 차집관거의 용량이 부족 우천시 오수역류 ○ 차집관거 주요 우수토실 개량으로 하천 수질개선및 하수처리비 절감

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 송천동 붓내마을 (우수토실개량 : 전주천, 삼천)

○ 사 업 량 : 차집관거 증설 L= 1.6Km, 우수토실 개량 8개소

○ 사 업 비 : 4,023백만원(국 2,011, 도 1,006, 시 1,006)

○ 사업기간 : 2006 ～ 2007(2개년)

□ 추진상황

○ 기본 및 실시설계 용역 완료 ---------------- 2005.12.30

○ 설계 사전심사 및 공사 발주 의뢰(조달청) --- 2006. 4.27

○ 공사 입찰 및 착공 ------------------------ 2006. 7. 4

□ 금후계획

○ 우수토실 개량공사 완료 ------------------- 2006.12

○ 차집관로 증설 및 사업 준공 --------------- 2007.12

전주시 하수도정비기본계획 변경용역

	추 진 배 경
○ 근 거 : 하수도법제15조의2에 의거 5년마다 재검토 ○ 도시관리계획 변경(도시계획 재정비)과 연계한 하수관망 구축

□ 용역개요

○ 대상지역 : 중앙처리구역 등 6개 처리구역 53.09㎢

○ 용역금액 : 1,074백만원(시비 1,074백만원)

○ 과업기간 : 2006. 1. 6 ～ 2007. 1. 5(1개년)

□ 주요 과업내용

○ 2005년도 호우에 따른 저지대 침수지역 해소대책

○ 오염총량제 시행에 따른 수질오염 분석 및 저감대책

○ 변방마을 하수처리 구역 편입 및 마을하수도 설치

○ 하천유지용수, 공업용수등 고도처리수 재이용 계획

○ 시가화 예정지 개발계획에 따른 능동적인 하수처리 계획

□ 추진상황

○ 전주시 하수도정비 기본계획 수립(최초) -------- 1984. 12

○ 하수도정비 기본계획 변경(이전) --------------- 1999.  6.

○ 하수도정비 기본계획 변경 착수(금회) ---------- 2006.  1.

□ 금후계획

○ 하수도정비 기본계획 승인신청(전주시→환경부) - 2006.  8

○ 하수도정비 기본계획 승인(환경부→전주시) ---- 2006. 12.

○ 용역 준공 및 성과도서 납품 ------------------ 2007.  1.

하수처리장 민간위탁 관리

	추 진 배 경
○ 민간기업의 전문기술 도입으로 하수처리장 효율적 운영 ○ 인건비등 운영비용의 절감으로 시 재정부담 경감

□ 사업개요

○ 위탁업체 : 전주개발(주)

○ 규    모 : 하수 403천톤/일, 위생 290㎘/일

○ 기    간 : 2004. 12. 1 ～ 2024. 11. 30(20년간)

○ 운 영 비 : 6,400백만원/년(하수처리 6,000, 위생처리 400)

○ 협약보증수질

(단위㎎/ℓ)

항목 구분	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균	비 고
1․2단계	20	33	20	27	2.5	3000	고도처리완료 이전까지
3단계	10	40	10	20	2.0	2000	법적수질기준

□ 추진상황

○ 제1단계(103천톤/일) 처리장 준공 --------- 1990. 3.30

○ 제2단계(200천톤/일) 처리장 준공 --------- 1997.12.10

○ 제3단계(100천톤/일) 증설공사 및 관리운영협약체결 - 2002. 2. 1

○ 제3단계(100천톤/일) 증설공사 및 관리운영협약변경 - 2004. 9.16

○ 제3단계 처리장 준공 및 민간위탁 운영 개시 - 2004.12. 1

□ 금후계획

○ 수탁업체 지도/감독 강화로 민간위탁 운영 효과 제고

○ 고도처리공사 준공후 관리운영 협약 변경 --- 2007. 8

차량등록사업소 소관

ꊱ	건설기계등록 처리기간 1/2 단축운영 ------	58
ꊲ	다시찾고싶은『차량등록사업소』이미지혁신 --	59

건설기계등록 처리기간 1/2 단축운영

	추 진 배 경
○ 건설기계 이전등록 처리 장기간 소요로 민원인 불만 초래 ○ 유기민원의 투명성 제고와 수요자 중심의 행정서비스 제공

□ 추진방향

○ 기간단축 대상 유기민원사무

- 건설기계 신규 및 이전등록신청 민원

○ 민원 처리기간 단축운영

- 이전등록신청 : 현행 법정 처리기간 20일에서 10일로 단축

- 신규등록신청 : 건설기계 신규등록업무 10일에서 5일로 단축

○ 처리율 목표   : 현재 40％ ➩ 70％이상

□ 추진상황

○ 이전등록신청 민원 처리절차 개선

- 신청서류 해당 시·군으로 우편발송에서 전자문서로 통보

○ 해당 시·군에 전화독촉

○ 민원처리 완결과 동시 민원인에게 전화 통지

○ 1/2단축 처리율 83％(346건중 289건)

□ 금후계획

○ 지속적인 추진으로 수요자 중심 행정 구현

다시찾고싶은『차량등록사업소』이미지 혁신

	추 진 배 경
○ 자동차등록업무의 전문성 제고로 일류 민원행정 실현 ○ 업무능력개발과 고품질서비스로 신뢰받는 공무원상 구현

□ 추진방향

○ 민원쇄신 혁신운동 추진

- 변화와 혁신을 선도할 수 있는 교육훈련 실시

○ 업무능력개발 전문성 확보

- 민원업무 능력 배양을 위한 토론 및 학습의 날 운영

○ 차량등록 행정서비스 품질 향상

- 민원인과의 신뢰구축을 위한 친절서비스 운동 전개

□ 추진상황

○ 실무능력향상을 위한 학습의 날 지정 운영 ------ 5회

- 월 2회(매주 2․4째주 금요일)

○ 혁신 동아리 구성 운영 ------------------------ 7회

- 팀  명 : 네바퀴

- 구성원 : 팀장 외 11인

○ 혁신교육 및 워크숍 참석 ---------------------- 4명

- 간부공무원 혁신 특별교육 : 1명(소    장)

- 혁신 변화관리자반        : 1명(등록담당)

- 창조적 변화반            : 1명(서    무)

- 혁신 동아리반            : 1명(간    사)

□ 금후계획

○ 실무능력 향상을 위한 학습의 날 지정 운영 -- 월 2회

○ 혁신 동아리 지속적 운영 : 월2회

○ 유관기관간 협력체계 구축 간담회 개최 ------ 2회(반기)

○ 전문가 초빙 효과적인 의사전달방법 교육 ---- 2회(반기)