제239회 전주시의회 제2차 정례회

행정사무감사 / 도시건설위원회

2006년도

주요업무 추진상황 보고

도     시     국

보  고  순  서

□	일 반 현 황		----------	2
□	부 서 별 주 요 기 능		----------	3
□	2006 주요업무 추진상황		----------	10
	○	도 시 계 획 과	----------	11
	○	주 택 행 정 과	----------	16
	○	도 시 개 발 과	----------	24
	○	도 심 진 흥 과	----------	32
	○	녹 지 공 원 과	----------	38

일  반  현  황

ꏚ 기   구 :  5과 22팀 (현원 84명)

													도 시 국
	도시계획과 (5 담당)							주택행정과 (5 담당)							도시개발과 (5 담당)							도심진흥과 (3 담당)							녹지공원과 (4 담당)
	도시행정							주택행정							용지보상							도심경제지원							녹지관리
	도시계획							공동주택							택지개발							도심진흥							녹지조성
	도시기반							일반건축							공단조성
																						도심시설
																													공원조성
	35사단이전							건축시설							도시시설														산림관리
	토지관리							농촌지역개발							신시가지조성

ꏚ 정‧현원

과 별		총 계	일 반 직						별정	기능
			4급	5급	6급	7급	8급	9급
계	정 원	84	1	5	22	28	18	3	1	6
	현 원	84	1	5	21	36	10	2	2	7
도시계획과	정 원	21	1	1	5	7	4	1	1	1
	현 원	21	1	1	5	10	1	1	1	1
주택행정과	정 원	16		1	5	6	4
	현 원	17		1	5	7	3			1
도시개발과	정 원	19		1	5	6	6	1
	현 원	19		1	5	9	4
도심진흥과	정 원	11		1	3	4	2			1
	현 원	11		1	3	5		1		1
녹지공원과	정 원	17		1	4	5	2	1		4
	현 원	16		1	3	5	2		1	4

부서별 주요기능

과 별	분 장 사 무
도시계획과	○ 전문건설업 및 건설기계사업자, 건설기계조종사 관리 ○ 구획정리사업지구 체비지 관리 ○ 도시계획결정․지적고시, 도시계획사업 시행인가 ○ 기반시설부담금 부과, 장기미집행 도시계획시설 매수청구 ○ 35사단 이전사업, 시가화 예정용지 개발업무 ○ 새주소 부여사업 관리, 개별공시지가, 지적측량검사
주택행정과	○ 국민주택상환금 운영, 학교용지부담금 부과징수, 주택사업특별회계 운영 ○ 주택건설사업계획승인, 사용검사, 주택정책 수립 ○ 건축인․허가, 건축심의, 건축조례 제․개정운영 ○ 공공용건축물 신축 등 건축공사사업 ○ 농촌지역 환경개선사업 ○ 컨벤션복합시설 건립 및 서신복합문화센터 건립
도시개발과	○ 서부 신시가지 조성사업 및 용지보상 ○ 택지개발사업․구획정리사업, 도시개발사업 ○ 연초제조창부지 활용방안 협의 ○ 도시첨단산업단지 조성사업 ○ 청소년의 거리 및 문화광장 조성사업
도심진흥과	○ 재래시장 시설현대화 및 경영혁신 투자 ○ 주택재개발 재건축 사업추진 ○ 도시주거환경정비 기본계획 수립 ○ 정비계획 수립 및 정비구역 지정 ○ 도시주거환경사업 추진 ○ 구도심 상가 활성화사업 추진
녹지공원과	○ 도시녹화사업의 종합계획수립 ○ 가로수 식재계획 수립 및 녹지시설물 관리 ○ 산불방지 최소화 대책 및 산림사업 추진 ○ 국토공원화사업 추진 ○ 공원조성계획 수립 및 조성사업 ○시립양묘장 관리

ꏚ 기본현황

○ 도시계획 연혁

년 월 일	고 시 청	번 호	계획면적 (㎢)	목표 년도	계획인구	주 요 내 용
1938. 5. 9	조선총독부	403	19.76	1948	100,000	도시계획구역 결정(1차)
1966. 2.10	건설교통부	2,188	108.71	1983	550,000	도시계획 재정비(2차)
1970. 4.14	″	178	157.22	1986	500,000	도시계획 재정비(3차)
1973. 6.27	″	258	313.20			개발제한구역 216.4㎢ 지정
1974. 8.14	″	272	313.20			도시계획 재정비(4차)
1976. 3.27	″	37	313.20			도시계획 재정비(5차)
1986. 5. 8	″	206	313.20	1991	610,000	도시계획 재정비(6차)
1995. 6.29	전라북도	112	313.20	2001	860,000	도시계획 재정비(7차)
2003. 6.26	건설교통부	161	302.67			개발제한구역 225.4㎢해제
2005. 7.29	전라북도	186	313.18	2010	748,000	도시계획 재정비(8차)

○ 용도지역 ----------- 4개지역 304.53㎢(비도시지역8.65㎢제외)

구분	주 거 지 역			상업 지역	공 업 지 역				녹 지 지 역
	계	일 반 주 거	준주거		계	전용공업	일반 공업	준 공업	계	생산 녹지	자연 녹지	보전 녹지
면적	31.933	31.576	0.357	4.114	6.202	1.444	3.865	0.893	262.281	40.722	109.217	112.342
비율 (%)	10.6	10.5	0.1	1.3	2.0	0.5	1.2	0.3	86.1	13.3	35.9	36.9

○ 용도지구  ------------- 7개지구 21,536,457천㎡ (6,515천평)

지 구 명	개 소 수	면 적(㎡)	비 고
고 도	16	7,955,679
방 화	21	4,078,717
미 관	73	3,619,747
자연취락	250	5,213,095
경 관	7	413,140
시설보호	1	249,900
보 존	2	6,179

○ 주   택

(단위 : 세대)

구 분	계	단독주택	다세대 주택 동당660㎡미만	연립주택 (4층이하)	아파트 (5층이상)	주택보급율 (2005년도)
주택수	189,505	59,080	5,969	4,589	119,867	90.64%
비율(%)	100	31.18	3.15	2.42	63.25

○ 토   지

(단위 : ㎢)

구분	합 계		대 지			임 야			기 타
	필지수	면적	필지수	면적	%	필지수	면적	%	필지수	면적	%
계	193,720	206.2	73,437	24.7	12.0	11,225	72.0	34.9	111,058	109.5	53.1

○ 건설기계조종사 면허현황

(단위 : 건)

계	불도우저	굴삭기	로우더	지게차	기중기	로울러	기 타
6,908	370	2,242	594	1,690	316	152	1,544

○ 재래시장 현황

시장명	소재지	개 장 년월일	시장규모			상가특성	비고
			상가수	종사자수	일일방문자 수
남부시장	전동 295-4	‘78.10.13	301	1,200	8,000	가구, 주단
동부시장	경원동3가 90-13	‘82. 5.28	38	30	1,500	주상복합
서부시장	효자동1가 201-2	‘82.10.26	58	34	1,300	주상복합
중앙시장	태평동 36-1	‘99. 2.12	380	397	5,000	의 류, 귀금속
모래내시장	인후동2가 203-10	70년대 자연발생	300	300	2,000	인근 시군 농산물거래

○ 도시 주거환경정비 예정지구 현황

방 식	개소수	면 적 (㏊)	세 대 수			인구수(천명)
			계	현재	증가	계	현재	증가
계	61	438.3	61,027	24,251	36,776	183	73	110
주택재개발	28	237.5	41,328	11,503	29,825	124	34	90
주택재건축	10	30.4	5,783	3,277	2,506	17	10	7
주거환경개선	18	134.9	7,399	7,399	0	22	22	0
사업유형유보	5	35.5	6,517	2,072	4,445	20	7	13

○ 특정․특화거리

거 리 명	구 간	연장(m)	지정일자	비고
계	7 개소	4,120
차이나거리	다가우체국 ➩ 다가파출소 ➩ 충경로	250	2003년 12월
웨딩거리	우체국 ➩ 다가파출소	440	“
약전거리	풍남문 ➩ 다가우체국	500	“
걷고싶은거리	오거리 ➩ 객사, 기린오피스텔➩팔달로 새하나백화점 ➩ 팔달로	830	“
영화거리	오거리 ➩ 피카디리극장 ➩ 명화극장	1,200	“
동문거리	팔달로 ➩ 동문사거리	300	“
공구거리	시청광장 ➩ 전주초교	600	“

○ 공원현황

(단위 : 개소, ㎡)

공원의 종 류	공원수 (조성)	공 원 면 적			비 고
		계	조 성	미 조성
계	135 (120)	21,092,886	3,384,559	17,708,327
도립공원	1 (0)	6,005,241		6,005,241	○ 미조성:(1) 모악산
도시자연공원	5 (1)	8,473,922	249,900	8,224,022	○ 일부조성:(1) 기린공원 ○ 미 조 성:(4) 산성, 삼천 천잠, 황방산
근 린 공 원	31 (22)	5,979,068	2,500,363	3,478,705	○ 조 성 : 중앙공원등 18개소 ○ 일부조성:(4)화산,완산,인후,덕진 ○ 미 조 성: (9)다가,신성,안행,가련산.등
어린이 공원	97 (96)	213,335	212,976	359	○ 조 성 : 노송공원 등 96개소 ○ 미조성:(1) 평화 제1공원
묘 지 공 원	1 (1)	421,320	421,320		○ 조 성:(1) 효자동 공원묘지

○ 공원 분포현황

구 분	도시계획구역		공 원 면 적			공 원 결정율 (C/A)	1인당 공원면적
	면적(A)	인구(B)	결정(C)	조성(D)	조성율 (D/C)		결 정 (C/B)	조 성 (D/B)
계	313.2㎢	623천명	21.1㎢	3.4㎢	16.1%	6.7%	33.9㎡	5.5㎡

※ 1인당 공원면적 : 수원 10.1/2.4, 성남 19.9/10.8, 안양 14.2/1.9

○ 공원시설물 현황

(단위:점)

계	도시자연공원	근린공원	어린이공원	비 고
6,018	475	2,777	2,766

○ 가로수 식재 현황

(단위:주)

노선수	계	수 종 별
		은행나무	느티나무	벚나무	단풍나무	기 타
124	39,089	13,057	6,873	5,733	3,133	10,293

○ 보호수 및 노거수 현황

(단위:주)

구 분	계	은행나무	느티나무	참죽나무	회화나무	왕버들	팽나무	주엽나무
보호수	26	7	9	1	1	7	1
노거수	25	1	8		1	2	12	1

○ 소유별 임야면적

(단위:㏊)

총 계	국유림	공유림	사유림	비 고
6,504	710	71	5,723

○ 보전산지 현황

(단위:㏊)

계	문 화 재 보호구역	보전녹지	자연공원	사찰림	조 수 보호구	비고
4,351	45	3,678	599	6	23

○ 시립 양묘장

위 치		면 적 (㎡)	시 설 (동)	년간생산 (천본)	보 유 장 비
포지별	2개소	29,936 (9,000평)	비닐하우스:26 관리사 : 2 창 고 : 2	2,000
제 1포지 (삼천동)	완산구 삼천동 1가 546-1	10,000	비닐하우스:16 관리사 : 2 창 고 : 2	800	트렉타,경운기
제 2포지 (호동골)	덕진구 우아동 1가 851	19,936	비닐하우스:10	1,200	온풍기 등

2006년도 시책방향

	도시공간 구조개선으로 광역도시 기반구축
○ 100만 인구의 수용이 가능한 도시기반시설 확충 ○ 생태적이고 쾌적한 환경조성으로 경쟁력있는 도시건설 ○ 아름답고 특색있는 도시경관 조성을 위한 기틀 마련 ○ 시민과 함께하는 녹색복지도시 구현

⇩

	중점추진방향
			ㅡ
		ㅣ
○ 광역도시 기반시설을 위한 도시계획 재정비 마무리 ○ 35사단을 중심으로 한 북부권 개발 및 도시첨단 산업단지조성 ○ 공공기관 이전에 대비한 혁신도시 건설 ○ 일자리 창출을 위한 기업기반 도시조성 ○ 구도심과 신시가지 균형발전으로 시민의 삶의 질 향상 ○ 100만 광역도시에 대비 택지개발을 통한 안정적인 주택공급 및 도시기반시설 구축 ○ 도심의 녹지축 조성으로 생태환경 도시건설 ○ 자연과 사람이 더불어 사는 쾌적한 녹색복지도시 조성

2006년도

주요업무 추진상황

도시계획과 소관

ꊱ	전주 도시기본계획 일부변경 추진	……	12
ꊲ	기반시설부담금 부과 및 징수	……	13
ꊳ	35사단 이전 및 부지개발사업	……	14
ꊴ	새(도로명)주소 부여사업	……	15

전주 도시기본계획 일부변경 추진

□ 기본계획 현황

○ 목표연도 : 2021년

○ 도시계획구역 면적 : 313.18㎢

○ 목표연도 계획인구 : 850천명

○ 전주도시기본계획승인(건교부) : 2002. 9. 25

□ 일부 변경계획

○ 혁시도시 예정지(보전용지➩시가화예정용지) : 9.26㎢(280만평)

○ 만성동 일대 복합단지 조성(보전용지➩시가화예정용지) : 2.67㎢(80만평)

○ 완주군 콩쥐팥쥐 동화마을(보전용지➩시가화예정용지) : 0.32㎢(9.7만평)

○ 종합경기장 부지활용(주거용지 ➩ 상업용지) : 0.12㎢(3.6만평)

□ 추진상황

○ 종합운동장 및 만성동일원의 합리적인 토지이용 활용방안 수립용역 추진

- 계약 : 2005.3.25(행정절차이행 및 혁신도시 미확정, 2005.8.11중지)

○ 혁신도시 예정지 확정발표 : 2005. 10. 28

○ 기본계획 일부 변경 ‘안’ 확정 : 2006. 10.

○ 도시기본계획 일부변경을 위한 공청회 및 주민의견청취 :

2006. 10. 12 ～ 11.10

○ 전주시의회 의견청취 : 2006. 11. 17

□ 금후계획

○ 시 도시계획위원회 자문   : 2006. 11.

○ 기본계획 변경 승인 신청  : 2006. 11.

○ 도 도시계획위원회 심의 및 승인 : 2006. 12.

기반시설부담금 부과 및 징수

○ 건축물의 건축행위로 인하여 유발되는 기반시설의 설치․정비      또는 개량행위에 필요한 재원을 확보하고 토지의 합리적인       이용을 촉진함으로써 시민의 삶의 질을 향상시키고자 함.

□ 주요내용

○ 8.31 종합부동산대책과 관련 기반시설부담금에 관한 법률이          ‘06.1.11 공포되어 6월의 유예기간을 거쳐 ’06.7.12일부터 시행

- 부과대상 : 건축연면적 200㎡를 초과하는 건축물의 건축                    행위

- 부과시점 : 건축허가(사업승인)를 받은 날

- 결정부과 : 부과기준시점부터 2월이내에 결정 부과하고                      납부일은 부과후 2월이내 납부

- 부담금의 배분 : 국가 30%, 전주시 70% (기반시설 특별회계 설치)

- 부담금사용 : 기반시설 설치, 기반시설에 필요한 용지확보

□ 추진상황

○ 전주시 평균공시지가 산정 및 고시                 : ‘06. 7.19

○ 기반시설특별회계 설치․운용조례 공포           : ‘06. 8.11

○ 기반시설부담금 부과(53건 671백만원)        :  ‘06. 9 .12

○ 기반시설특별회계 설치․운용조례 시행규칙 공포  : ‘06. 12.

□ 금후계획

○ 건축허가,증축에 따른 과세자료 누락되는일이 없도록 조사철저

○ 체납자 징수대책 강구 : 독촉장 발부 및 체납자 재산압류 등

35사단 이전 및 부지개발사업

○ 35사단은 전주 북부권의 중심축에 위치하여 북부권의 발전       을 가로막고 있어 전주․완주 등을 아우르는 광역적 도시개발과

지역 균형발전을 위하여 부대이전이 시급한 실정임.

□ 개    요

○ 사업내용 : 35사단(206항공대 포함) 이전 및 부지개발

○ 부지면적 : 60만평(35사단 35, 206항공대 9.6, 사유지 등 15.4)

○ 사업기간 : 2006. 3. ～ 2014. 2 (8년간)

□ 추진상황

○ ’05. 11월 : 35사단 이전 합의각서 체결

○ ’05. 12월 : 전주시의회 35사단 이전 사업계획서 동의

○ ’06.  3월 : 민간사업자 시행협약 체결 (4월 법인설립 완료)

○ ’06.  5월 :『부대이전 및 부지개발사업 기금 설치․운용조례』공포

○ ’06.  7월 : 사전환경성 검토 협의 (환경부)

○ ’06.  9월 : 35사단 이전 기본설계 기술심의 (국방부)

□ 금후계획

○ 편입용지 감정평가 보상 착수         -------   ’07.  1월

○ 국방부 실시계획 승인                -------   ’07.  2월

○ 실시설계 완료 및 설계심의           -------   ’07.  8월

- 각종 심의, 건축협의 등 인허가 절차완료

○ 부대이전 공사 착공                  -------  ’07.  9월

< 부지개발 방향 확정 >               -------  ‘08.  2월

○ 부대이전 공사완공 및 35사단이전    -------  ’10. 12월

- 부대시설 기부 및 현 주둔지 시설 양여 절차 이행

○ 부지개발 사업 착수                 -------  ’11.  1월

○ 부지개발 사업 완료                 -------  ’14.  2월

새(도로명)주소 부여사업

○ 새주소 사업이 완료되어 유지관리 및 시민이 편리한 생활        주소로 활용할 수 있도록 홍보에 주력하였으나

『도로명주소등 표기에 관한 법률』이 2007. 4. 5일부터

시행됨에 따라 이에 대한 후속조치와 사전 대비하기 위함

□ 개    요

○ 기  간 : 1999. 1 ~ 2002. 5. 30(이후 계속 유지관리)

○ 대  상 : 전주시 관내 전지역

○ 사업비 : 1,850백만원(국비 210,  시비 1,640)

○ 시설물 : 도로명판 5,670개소, 건물번호판 65,000개 부착

□ 추진상황

○ 도로명 새주소 안내지도 제작 배부 및 사용방법 등 교육 홍보

- 안내지도 170,000부,  책자 5,000부

○ 버스승강장에 도로명 새주소 안내지도 설치 : 200개소

○ JTV, 전주교통방송에 도로명 새주소 및 유래홍보 : 45회

○ 인터넷 새주소안내 시스템 운영 : 접속자수 129,000(1일 200명)

○ 2006년 유치원 66개소, 초등학생 1,075명, 극장 8개관 325회 홍보

○ 2006년 도로명판 76개, 건물번호판 4,038개 도시개발지구에 설치

□ 금후계획

○ 도로명주소 체계의 계획 기간내 구축

- 2009년까지 시설완료, 2011년까지 지번주소, 도로명주소 병행사용,      - 2012년 이후 도로명주소만 사용

○ 도로명주소 통합센터 구축하여 포털사이트를 통한 안내서비스제공

○ 도로명주소의 법적주소 전환에 따른 각종매체를 통한 대대적 홍보

○ 도로명주소를 재확인하여 정확성 확보 후 고지ㆍ고시

○ 도로명주소 시설물에 대한 일제정비(망실 훼손분, 신규개발지)

○ 도로명주소 DB정비 비치 및 각급기관ㆍ기업 등에 제공

주택행정과 소관

ꊱ	노후 공동주택 관리비용 지원	……	17
ꊲ	전주시 주택․건축조례 개정	……	18
ꊳ	공공용 건축물 신축 등 건축공사 사업	……	19
ꊴ	전주 문화시설(컨벤션센터) 건립	……	20
ꊵ	서신복합문화센터 건립	……	21
ꊶ	농촌주거환경개선(마을정비)사업	……	22
ꊷ	농촌마을환경개선(숙원)사업	……	23

노후공동주택 관리비용 지원

○ 소형평형 노후 공동주택은 주거환경이 열악하고 자체관리

능력이 부족하므로 관리비용의 일부를 지원하여 주거환경개선

□ 개    요

○ 위    치 : 전주시 관내 노후 소형평형 공동주택

○ 공동주택 관리비용 일부지원

- 지원대상 : 15년이상, 전용 60㎡이하가 50%이상인 단지

(’06년 대상 - 81단지 12,179세대)

- 지원금액 : 사업비의 70%이하로서 1,000만원이하

○ 2006년도 예산확보 : 300백만원(본 200, 추경 100)

□ 추진상황

○ 노후공동주택관리지원을 위해 주택조례제정 -- 2005. 6.24

○ 관리비용지원 홍보 및 지원신청접수 --------- 2006. 2월~4월

○ 지원대상단지 확정 통보(본예산분) ---------- 2006. 6. 23

- 22개단지, 200백만원

○ 지원대상단지 확정 통보(추경분) ------------ 2006. 10.27

- 10개단지, 100백만원

□ 금후계획

○ 사업완료후 관리비용지원 정산 ------------- 2006. 12월

전주시 주택 ․ 건축조례 개정

○ 도심 열섬현상방지 및 자연친화적인 주거공간 확보를 위해

단지내 연못 등 친수공간 설치 (주택조례)

○ 건축심의 대상확대와 대지안의 공지를 신설 도시미관

향상 및 주거환경개선 (건축조례)

□ 주요내용

○ 주택건설기준 변경 (신설)

- 300세대이상의 공동주택에 친수 공간 의무설치 자체관리

•전주시의 열섬방지 및 자연친화적인 거주환경조성을 위해

친수공간을 설치의무화 : 분수, 벽천, 연못, 실개천 등

○ 건축심의 대상 확대

- 미관지구안의 건축물 및 공동주택 100세대이상 등

○ 건축공사현장 안전관리예치금 제도 도입 (신설)

- 바닥면적의 합계가 5,000㎡ 이상인 건축물

○ 대지안의 공지확보 기준마련 (신설)

- 건축물의 용도별로 인접대지 경계선 및 건축선으로부터

1미터 ～ 3미터 이격

□ 추진상항

○ 입법예고 ---------------------------- 2006.7.21∼8.21

○ 전문가 간담회 ---------------------------------- 2006. 8.31

○ 전주시건축위원회 심의  ---------------------  2006. 9.25

○ 전주시 규제심사 위원회(원안가결) ----------- 2006.10.19

○ 전주시 도시건설위원회 간담회 --------------- 2006.11.02

○ 전주시 조례규칙 심의 ----------------------- 2006.11.10

□ 금후계획

○ 조례안 의회상정 및 공포예정 ----------------- 2006.11~12월

공공용 건축물 신축 등 건축공사 사업

□ 개    요

관련부서	사 업 명	사업비 (백만원)	규 모
시민생활 지 원 과	자원봉사혁신센타증축	2,635	지상 3층 면적1,824㎡(553평)
생활경제과	농수산물가공처리장 신축	350	가공처리장 450㎡
체육지원과	태평동 전주청소년 문화의집 증축 및 보수	237	강당 329㎡
		175	지하층 개․보수 326.04㎡
시립도서관	완산동 도서관 보수	100	천정 텍스 교체
		15	내부 도색
동 물 원	순계류사 신축	200	동물사 160.84㎡
	공중화장실 신축	150	화장실 97.02㎡

□ 추진상황

○ 관련부서 협의 업무 취합 -------------------- 2006. 1.15

○ 전주자원봉사교육혁신센터 착공 -------------- 2006. 3. 2

○ 농수산물 가공처리장 신축공사 완공 ---------- 2006. 3.24

○ 청소년 문화의집 3층 강당 증축공사 완공 ----- 2006. 6.27

○ 시립도서관 환경개선사업 완공 --------------- 2006. 6.28

○ 동물원 공중화장실 및 순계류사 착공 --------- 2006.10.13

○ 청소년 문화의집 지하층 개․보수공사 완공 --- 2006.11. 6

□ 금후계획

○ 전주자원봉사교육혁신센터 완공 ------------- 2006.12월

○ 동물원 화장실, 순계류사 신축공사 완공 ----- 2007. 1월

전주 문화시설(컨벤션센터) 건립

○ 컨벤션센터시설을 건립 국제화시대에 부응하고 문화․관광

산업 발전에 기여하고자 함.

□ 개    요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 덕진동 1가 1220-16번지(현. 종합경기장)

○ 부지면적 : 36,377평(시유지 35,175, 국유지 1,202)

○ 사업내용

- 기본시설 : 전기․컨벤션, 호텔, 도시공원 등 복합시설

- 제안시설 : 사회기반시설에 관한 민간투자법상 가능한 모든 시설

○ 사업 추진방식 : 민간제안사업(건설 ⇨ 기부채납 ⇨ 운영)

□ 추진상황

○ 컨벤션복합시설지구 기본구상 정책연구 용역 -- 2004.10 ~ 12월

○ 민간투자자 사업설명회 및 투자의향 간담회 개최 --- 2005. 4.22

○ 종합경기장 대체시설 타당성 용역 ------------ 2005. 5 ~ 12월

○ 도유재산 양여계약 체결(도 ⇨ 전주시) ------- 2005.12.19

○ 전주시로 소유권 이전등기 완료 -------------- 2006. 5. 4

○ 도시계획시설 변경(용도변경) 공청회 --------- 2006.10.27

□ 금후계획

○ 혁신도시 기본계획(개발계획) 확정 후 단계별 추진계획에

맞춰 무상양여 조건 등 전라북도와 협의하여 여론수렴 과정을

거쳐 추진   ----------------------------------   2007년

서신복합문화센터 건립

○ 신흥개발 중심지에 복합문화시설을 건립하여 주민의 편익

제공 및 삶의 질 향상과 지역주민의 자치역량 제고

□ 개    요

○ 위    치 : 완산구 서신동 804번지외 1(서신동사무소 옆)

○ 부지면적 : 2,016.7㎡(610평)

○ 건립규모 : 지하1층/지상5층,   연면적 : 6,105㎡(1,846평)

○ 사업기간 : ‘06 ～ ’08(3개년)

○ 총사업비 : 80억원(국 10, 특교 5, 도 10, 시 45, 청사정비기금 10)

- 예산확보 : 27억원(국 10, 특교 5, 도 5, 시 7)

□ 추진상황

○ 타당성조사 용역 완료  -------------------  2005. 9.15

○ 설계 현상공모(당선 : (주)길건축)  -------  2005. 11～12

○ 주민설명회 개최(전북도건축사회관 주민 등 190명 참석)  -----  2006. 2.17

○ 기본설계 승인(설계자문위원회 자문 6. 11)  ------  2006. 6.16

○ 건축위원회 심의  ------------------------  2006. 8.14

○ 설계 납품(설계자문위원회 자문 8. 11) ----  2006. 8.21

○ 발 주    --------------------------------  2006.10.25

□ 금후계획

○ 착   공  --------------------------------  2006.12.15

○ 준   공  --------------------------------  2008. 7.30

농촌주거환경개선(마을정비)사업

○ 농촌지역 하천수질 오염방지 및 농촌마을의 열악한 도시기반

시설을 개량하여 쾌적하고 살기좋은 농촌마을 조성

□ 개    요

○ 사업대상 : 전주시 하수도정비기본계획 구역 외 67개 농촌자연마을

○ 총사업비 : 860억원(국비 603  시비 257)

○ 사업기간 : 2004 ~ 2014(11개년)

○ 사업방법 : 행정자치부 사업계획 승인후 국비보조사업으로 추진

○ 공사개요  ---  12개지구 90억원(국비 53, 시비 37)

- 2004 사업 : 4개지구  16억원(국비 13, 시비   3)

- 2005 사업 : 7개지구  60억원(국비 30, 시비  30)

- 2006 사업 : 1개지구  14억원(국비 10, 시비   4)

□ 추진상황

○ 2005 이월사업 7개지구 완공  -----------  2006. 3.23 ~ 9. 1

- 7개지구(용산, 원색장, 영동재방, 원산정, 삼거, 문정, 황소)

○ 2006 사업추진(덕진구 도도마을)

- 공법선정(분뇨 및 고농도 유기 오․폐수의 고도처리방법) --- 2006. 6.16

- 주민설명회 개최 ------------------------ 2006. 8.28

- 실시설계 용역완료(한 컨설턴트 대표 한 창희) --- 2006. 9. 2

- 공사계약(한승종합건설 대표 김 수길) ---- 2006. 11. 8

※ 행자부 농촌마을하수도 정비사업 환경부 이관 ----- 2006. 8.29

□ 금후계획

○ 착공 및 준공  ------------------------  2006.11 ~ 2007.5월

농촌마을 환경개선(숙원)사업

○ 도시와 상대적으로 소외받고 있는 농촌마을의 열악한 환경을 개선

하여 살기좋은 농촌을 건설하고 도․농간의 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 마  을  수 : 206개 농촌자연마을(완산 80, 덕진 126)

○ 사 업 대 상 : 624건(도로, 하수도정비, 주민편익시설 등)

○ 총 소요예산 : 37,692백만원(시비)

○ 사 업 기 간 : 2005 ~ 2009(5개년)

○ 추 진 방 법 : 용역결과에 의거 순차적 사업시행

○ 공사개요 ----  71건  50억원

- 2005 사업 : 33건 완  공  30억원(완산 13, 덕진 17)

- 2006 사업 : 38건 공사중  20억원(완산  8, 덕진 12)

□ 추진상황

○ 농촌지역 중장기 개발계획 용역 완료 ------  2005. 2.28

○ 2006 사업추진 : 공정 85%(완공 24건, 공사중 14건)

- 사업비 마을 및 인구수 고려 예산 재배정 ------  2006. 1.25

- 사업대상지 조사 및 확정, 주민설명회 개최 -----  2006. 2.28

- 설계용역완료 --------------------------  2006. 6.10

- 사업발주 ------------------------------  2006. 7월초

□ 금후계획

○ 공사준공 -------------------------------   2006. 12월

도시개발과 소관

ꊱ	서부신시가지 도시개발사업	……	25
ꊲ	택지개발 및 도시개발사업	……	26
ꊳ	전북 혁신도시 조성사업	……	27
ꊴ	만성지구 복합단지 조성사업	……	28
ꊵ	도시첨단 산업단지 조성사업	……	29
ꊶ	친환경 첨단 복합단지 조성사업	……	30
ꊷ	청소년의 거리 및 문화광장 조성사업	……	31

서부신시가지 도시개발사업

○ 전라북도 중추기능을 담당할 미래지향적인 신시가지 건설

○ 경제적‧합리적인 신시가지 조성으로 전주시 공간구조의 개편

○ 양질의 택지공급으로 지역경제 활성화 및 주민숙원사업 해소

□ 사업개요

○ 사업규모 : 부지조성76만평, 교량 3개소, 공원12개소

(세대수 4,224 ,   수용인구 12,672 )

○ 사업기간 : 1999. 2 ~ 2007. 12(2003. 2. 27공사착수)

○ 사 업 비 : 4,406억원 (공사2,238, 보상963, 기타1,205)

○ 사업방식 : 도시개발법에 의한 도시개발사업 (환지+수용)

□ 추진상황 (공정 61%)

○ 체비지매각 : 680필지 3,972억원중 324필지3,037억원 (76%)

○ 부지조성공사 : 상업‧준주거 용지 등 부지조성 (61%)

- 도로 : 도청사, 경찰청사 주변도로 완료 (80%)

- 폐기물처리 (99%), 지장물철거 (98%)

○ 도청앞 근린3호공원 조성 완료( 공원 공정 34%)

○ 효자다리 및 이동교 준공 개통(교량 공정 88%)

□ 금후계획

○ 문화재발굴조사 및 문학대 이전완료 ------------- ’06.12.

○ 개발계획 및 지구단위계획 변경(전북도) 승인 ---- ’06.12.

○ 공사 준공 ------------------------------------- ’07.10.

○ 환지확정측량 및 처분절차이행 사업준공 --------- ’07.12.

택지개발 및 도시개발사업

〈유관기관사업〉

○ 토지이용의 합리화 및 도시의 균형발전과 택지의 효율적인      공급으로 쾌적한 주거환경조성

□ 사업개요

○ 효자 4지구 : 면적 115천평, 사업비   867억원(주공)

○ 효자 5지구 : 면적 149천평, 사업비 1,120억원(주공)

○ 하가지구 : 면적 129천평, 사업비   505억원(토공)

○ 효천지구 : 면적 203천평, 사업비 1,528억원(토공)

□ 추진상황

○ 효자 4지구 : 개발계획 승인 -------------- ’02.06.29

(택지개발)  착공(현공정 45%) -------- ’05.04.28

○ 효자 5지구 : 개발계획 승인 -----------------  ’04.09.30

(택지개발)  실시계획 승인 -----------------  ’06.04.27

○ 하가지구 : 개발계획 승인 ----------------  ’98.09.04

(택지개발)  착공(현공정 12%) ---------  ’05.08.09

○ 효천지구(도시개발) : 지구지정 -----------  ’05.12.27

□ 금후계획

○ 효자4지구 : 준공 --------------------------  ’07.12.

○ 효자5지구 : 착공 --------------------------  ’07.04.

준공 --------------------------  ’10.12.

○ 하가지구 : 준공 --------------------------  ’08.12.

○ 효천지구 : 개발계획승인 ------------------  ’07.06.

착공 --------------------------  ’09.06.

준공 --------------------------  ’12.06.

전북 혁신도시 조성사업

○ 공공기관의 지방이전을 통한 지역경제의 혁신거점을 조성

하여 낙후된 전북발전을 선도하고 국가의 균형발전의 토대 구축

□ 사업개요

○ 위   치 : 전주시 만성동, 중동, 장동, 완주군 이서면 일원

○ 면   적 : 혁신도시 280만평(전주 112만평, 완주 168만평)

○ 기   간 : 2006년 ～ 2012년도(7개년)

○ 사업시행자 : 건교부(한국토지공사)

□ 추진상황

○ 공공기관 지방이전 배치계획발표(13개공공기관확정) ----  ‘05.06.24

○ 토지거래 허가구역 지정(2,973만평,건교부) ----- ‘05.10.03

○ 혁신도시 입지 확정 ----------------------------- ‘05.11.30

○ 혁신도시 개발행위 제한 ----------------------- ‘05.12.02

○ 기본구상 / 도시기본계획 변경 용역 착수(토지공사) ------- ‘06.06.12

○ 지구지정 제안서 송부(건교부→전주시)  ---------------- ‘06.07.31

○ 주민공람공고 및 전문가 의견수렴 --------- 06.08.11~24

○ 도시기본계획 변경을 위한 주민공청회실시  ------ ‘06.10.27

□ 금후계획

○ 도시기본계획 변경 및 개발구역 지정 ----------- ‘06.11.

○ 개발계획 승인 ------------------------------- ‘07.05.

○ 토지 및 지장물 보상 ------------------------- ‘07.09.

○ 실시계획 승인 ------------------------------- ‘07.12.

○ 공사착공 ------------------------------------ ‘08.01.

○ 공사완공 및 공공기관 이전완료 --------------- ‘12.12.

만성지구 복합단지 조성사업

○ 100만 광역도시 기반구축에 걸맞는 미래지향적 저밀도의        친환경 생태도시를 조성하여 양질의 택지공급

□ 사업개요

○ 위   치 : 전주시 덕진구 만성동 일원

○ 면   적 : 50만평 정도

○ 기   간 : 2006년 ～ 2012년도(7개년)

□ 추진상황

○ 사법시설 신축부지 매입요청(전주지방법원) --- ‘02.01.22

○ 50만평 도시개발구역(만성동 일원) 결정 ------ ‘05.02.03

○ 토지거래 허가구역 지정(2,973만평,건교부) ---- ‘05.10.03

○ 도시기본계획 변경용역 착수 ----------------- ‘06.06.12

○ 관계기관 협의 및 전문가 자문 ------------------- ‘06.08.29

- 법원․검찰 등 15개기관 및 전문가

○ 도시기본계획변경을 위한 주민공청회실시  ------ ‘06.10.27

□ 금후계획

○ 사업시행 방법 및 시행자 결정--------------- ‘07.02.

○ 공사착공 ----------------------------------- ‘08.10.

○ 복합단지 준공 ------------------------------ ‘12.12.

도시첨단산업단지 조성사업

○ 낙후된 지역의 경제 회생을 위하여 전북지역 전략산업인

지식기반사업, 나노산업 등 미래지향적인 산업단지 조성

□ 개    요

○ 위    치 : 덕진구 팔복동 2가 727 일원(도 공무원교육원 인근)

○ 사업규모 : 단지조성 109,685㎡(33,180평)

○ 사 업 비 : 255억원(도비 60억원, 시비 195억원)

○ 사업기간 : 2004 ~ 2007(4년간)

□ 추진상황

○ 도시첨단산업단지 실시계획 승인 ---------- ’04.12.24

○ 기반조성공사 착공 -------------------------------- ‘05.10.27

○ 보상협의 완료 ------------------------------------ ‘06.07.12

○ 단지 조성 1차분(33,180평) 준공 ------------------ ‘06.08.28

○ 단지 조성 2차분(33,180평) 착공(공정 50%) ------ ‘06.06.27

□ 금후계획

○ 추경예산확보 17억(도비 10, 시비 7)3차공사 발주 -- ‘06.11.

○ 도비(23억원) 추가 확보후 4차공사 발주 ------------- ’07. 02.

○ 전체공사 완공  ------------------------------------  ’07. 06.

친환경 첨단 복합단지 조성사업

○ 지역경제 활성화 및 일자리 창출을 위하여 보다 많은 기업을

유치하기 위한 산업단지 조성사업이 절실히 요구됨

□ 개    요

○ 위      치 : 전주시 덕진구 팔복동 등 북부권 일대

○ 사업규모 : 60만평(1단계 4만평, 2단계 12만평, 3단계 44만평)

○ 사업기간 : 2007~2012(1단계 2009, 2단계 2010, 3단계 2012)

○ 예상사업비 : 4,500억원(1단계 400, 2단계 1,100, 3단계 3,000)

○ 개발방식 : 위탁 또는 민자유치

□ 1단계 추진 계획  (4만평, 400억원)

○ 사업참여 의사 타진(토공, 주공, 전북개발공사) -- ‘06.11.

○ 사업 시행자 지정 및 협약 체결  -------------  ‘06.12.

○ 산업단지 지정 및 사업계획 승인  -----------  ‘07.06.

○ 용지보상 및 공사 착공  ---------------------  ‘08.01.

○ 사업 준공  ---------------------------------  ‘09.06.

□ 2, 3단계 추진계획

〈2단계〉- (12만평,  1,100억원)

○ 타당성 분석 및 기본구상 용역   --------------- ‘07.10.

○ 사업 시행자 지정 및 협약  -----------------  ‘08.02.

○ 산업단지 지정 및 사업계획 승인  -------------  ‘08.09.

○ 용지보상 및 공사 착공  ---------------------  ‘09.01

○ 사업 준공  ---------------------------------  ‘10.12

〈3단계〉- (44만평,  3,000억원)

○ 도시기본계획 변경(관련법 절차이행) -- ‘08.01.～’09.06.

○ 사업시행 완료(2단계와 동일 절차)  -- ‘09.12.～ ’12.12

청소년의거리 및 문화광장 조성사업

○ 보행자 중심 가로환경조성으로 도심권 상징축으로 이미지 제고

○ 휴식이나 집회공간으로써 개방된 시민휴식 공간 조성

□ 개    요

○ 위    치 : 노송광장 ～ 문화광장 ~ 영화의 거리

○ 사업규모 : 거리조성 L=870m, 광장조성 2개소

○ 사업내용

- 노송광장 : 분수 및 휴식시설, 교통체계 개선

- 청소년의 거리 : 노송광장～문화광장 L=170m, 녹지 및 휴식공간

- 문화광장 : 북문 상징조형물, 분수, 조경, 공연장

- 영화의 거리 : 문화광장~프리머스(L=700m),상징조형물,벽화,바닥도판

○ 총사업비 : 30억원 (시비)

○ 사업기간 : 2006. 06 ～ 2008.12

□ 추진상황

○ 문화광장 지장물 철거 및 보상완료 ----------  ‘05.12.26

○ 실시설계 용역 착수(진도 30%) ------------  ‘06.09.29

□ 금후계획

○ 관련전문가 및 주민의견 수렴 ----------------  ‘06.11.

○ 실시설계 용역완료 (문화광장 1월) -----------  ‘07.02.

○ 공사착공 (문화광장 2월) --------------------  ‘07.05.

○ 영화제 개최이전 문화광장 기반시설 완료 -----  ‘07.04.

○ 공사준공   ---------------------------------  ‘08.12.

도심진흥과 소 관

ꊱ	재래시장 시설현대화 및 경영혁신 추진	……	33
ꊲ	도시 및 주거환경 정비 기본계획 수립	……	34
ꊳ	2단계 주거환경개선사업	……	35
ꊴ	주택재개발 재건축사업 추진	……	36
ꊵ	구도심활성화사업 추진	……	37

재래시장 시설현대화 및 경영혁신 추진

○ 유통시장 개방후 신업태의 확산 및 소비자 구매패턴의 변화로      재래시장의 경쟁력이 급격히 악화되어

○ 지역경제의 기반인 재래시장의 침체는 영세상인 생계불안 및         지역경제 위축요인으로 작용하여 시설현대화 및 경영혁신을 통한       자생력 배양과 시장 활성화의 기반구축이 시급한 실정임.

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2003년 ~ 2006년(4개년)

○ 사업비 : 14,963백만원(국비 8,786, 지방비 5,363, 민자 814)

○ 사업대상 : 5개재래시장(남부ㆍ모래내ㆍ중앙ㆍ동부․서부시장)

○ 사업의 주요내용

- 시설현대화 : 주차장, 아케이드, 고객편의시설 설치

- 경영현대화 : 마케팅, 경영혁신교육(상인대학), 공동상품권 등

□ 추진상황

○ 남부시장 : 아케이드 및 고객지원센터, 리모델링 4개동 완료(총7개동)

○ 모래내시장 : 주차장 및 진입도로 개설, 상인회 사무실 설치

○ 중앙시장 : 주차장 조성사업(부지 매입완료/시설 설계중)

○ 동부시장 : 상가방수 공사 및 시설 보수(셔터교체 등)

○ 서부시장 : 화장실 리모델링, 상징 대형 입간판 제작설치

○ 공통적 경영혁신사업 추진 : 교육, 상인 자생조직 육성, 각종 마케팅전개

□ 금후계획

○ 시설 현대화사업의 지속적 추진 ➩ 쾌적한 쇼핑환경 조성

○ 시장 경영혁신사업 강력추진(중소기업청과 연계)

- 남부시장 : 시범시장 육성, 구조개선사업(저온창고 설치), 이벤트행사

- 기  타 : 중앙시장(상인 교육장설치, 이벤트, 공동 쿠폰발행 등)                모래내시장(이벤트, 공동할인 쿠폰발행)

도시 및 주거환경정비 기본계획 수립

○ 개발사업에 대한 계획적 통제와 구체적 실천지침 및 전략제시

- 도시 및 주거환경정비법 (‘03. 6.30) : 50만이상 3년이내 수립 -

□ 기본계획 수립

○ 대상구역 : 61구역(목표년도 2010년)

- 주거환경개선사업 : 18구역, 주택재개발사업 : 28구역

주택재건축사업 : 10구역, 사업유형 유보 : 5구역

○ 건축물 밀도계획

- 용적율 : 1종 180%, 2종 230%, 공공용지 확보시 250%미만

- 건폐율 : 1종 60%, 2종 50%

- 층  수 : 7층~15층(1종7, 2종15, 1~2종 혼재지역 10~12)

※탑상형으로 계획시 층수 완화 : 최고층수 11층~25층 미만

○ 환경계획 : 녹지확보 세대당 2㎡이상, 생태면적30%이상

□ 추진상황

○ 전문가자문, 주민공람, 의회 의견청취 --------- ’06.  4월

○ 도시계획위원회 심의(전북도) ---------------- ’06.  6.28

○ 정비기본계획 승인(전북도) ------------------ ’06.  7. 4

○ 정비기본계획 고시 -------------------------- ’06.  7.14

○ 기본계획 변경 추진

-  기본계획변경 용역과제심의  ----------------- ‘06. 10.23

- 기본계획변경 용역발주 ---------------------- ‘06. 10.30

□ 금후계획

○ 신규지정 및 기본계획변경수립 -------2006.12～2007. 9

2단계 주거환경개선사업

○ 도시저소득 주민의 주거환경개선으로 삶의 질 향상을 도모

하고 더불어 사는 공동체 형성과 주민통합의 기회 제공

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2006~2010(5개년간 계속사업)

○ 사 업 비 : 1,002억원(국501억, 도100억, 시401억)

○ 지 구 수 : 현지개량 18지구 133ha

○ ‘06년사업계획 : 6,638백만원(국비3,319, 도비664, 시비2,655)

□ 추진상황

○ 도시주거환경개선 사업지구 확정(건교부) ---- ’04.  3. 26

○ 상반기 중앙투융자심사 완료(행자부) -------- ’05.  4. 12

○ 도시주거환경기본계획수립 고시 ------------- ’06.  7. 14

○ 정비계획(주거환경개선사업)용역발주 ------- ‘06. 10. 30

□ 금후계획

○ 사업지구 변경(신규지정 3개소) ----------- ‘06. 11 ~ 12

○ ‘06년 사업 변경추진 : 3,519백만원(국비3,319, 시비200)

- 지구별 정비계획 수립 및 사업추진 --- ‘06. 12 ~ ‘07. 6

○ 연차별 사업추진계획                       (단위: 건/백만원)

구 분	연차별 사업추진 계획						비고
	계	2006년	2007년	2008년	2009년	2010
사업량·	21	8	13	연차별 지속 추진		잔여사업 마 무 리
소 요 예산액	100,260	3,519	5,683	32,620	30,092	28,346

주택재개발 재건축사업 추진

○ 주거환경이 불량하고 노후된 건축물을 개량․정비함으로써

도시환경을 개선하고 시민의 주거생활의 질을 높이고자 함

□ 사업개요

○ 정비예정구역 현황 : 총 43개 구역

- 주택재개발사업 : 28구역

- 주택재건축사업 : 10구역

- 사업유형유보 구역 : 5구역

□ 추진상황

○ 도시 및 주거환경정비기본계획수립 --------- ’04.10～’06. 7

○ 재개발 추진위원회 승인 16개 구역 ------ ‘06. 7～ 현재

○ 재건축 추진위원회 승인 5개 구역 ----------- ‘06. 7～ 현재

○ 주민설명회 및 홍보 -------------------------- ‘06. 8～ 10월

- 15개동 주민설명회, 사업설명회 홍보 팜플렛 제작 배포

○ 태평1구역 정비계획  시 의회 의견청취 ------------ ‘06.11. 3

□ 금후계획

○ 물왕멀구역 정비계획 시 의회 의견청취 ------------ ‘06. 11월

○ 정비계획 시 도시계획위원회 자문 --------- ‘06. 12월

○ 정비계획 도 도시계획위원회 심의신청 ----- ‘07.1 ～ 2월

구도심 활성화 사업 추진

○ 구도심지역의 공동화 현상을 최소화하여 인구유입 및 상권

회생 활성화 방안모색(구도심활성화지원조례 공포 ’03.12)

□ 사업개요

○ 대    상 : 구도심권  7개동 12㎢

- 특화․특정거리 조성 : 7개소

(걷고싶은, 영화, 차이나, 웨딩, 약전, 동문, 공구거리)

- 보조금 지원 : 특화․특정거리 조성을 위한 지원

○ ’06추진계획 : 20억원(경관조명시설14, 보조금2,웨딩거리4)

□ 추진상황

○ 특화ㆍ특정거리 조성공사 완료 : 59억원(걷고싶은, 차이나, 영화거리)

○ 오거리 공영주차장 시설 완료 : 202면, 44억원

○ 보조금 지원 : 총 75건, 7억원(‘06년도 : 20건 2억원)

○ ‘06경관조명시설(루미나리에)설치완료 : 14억원(보조12, 자부담2)

○ 구도심활성화를 위한 위원회 구성(전문가, 주민, 관)운영

□ 금후계획

○ 웨딩거리 조성 지중화 사업(4억원) ---------------- ’06.12

○ 상주인구 확보를 위해 재개발사업 추진

○ 건폐율, 용적율 완화 및 주차장 설치비용 일부 감면등 행정지원

녹지공원과 소관

ꊱ	담장 없애기 사업	……	39
ꊲ	지정보호수 주변정비 및 쉼터조성사업	……	40
ꊳ	산불방지 최소화 대책 및 산림사업추진	……	41
ꊴ	삼천 녹색관광자원 조성사업	……	42
ꊵ	완산 생활체육공원 조성사업	……	43
ꊶ	덕진공원 제방길 산책로 조성사업	……	44
ꊷ	등산로 정비사업 및 시설물 보수	……	45

담장 없애기 사업

○ 세대․계층간 이웃간에 단절된 벽을 헐고 열린공간 조성을      통해 더불어 사는 공동체 구현 및 시민에게 친환경적인          휴식공간 제공

□ 사업개요

○ 위    치 : 동전주우체국 외 3개소

○ 사 업 비 : 300백만원

○ 사업기간 : 2006. 6. 14 ~ 9. 25

□ 추진실적

○ 관련전문가 의견수렴 (푸른전주 추진위원회) : 2005. 12. 22

○ 사업추진

- 개 소 수 : 4개소

- 사업내역 : 담장철거 284m, 수목식재 7,460그루, 휴게시설물 54점

□ 금후계획

○ 호응도가 크고 녹지공간 확보 효과가 큰점을 감안하여

추가 소요예산 확보후 년차적 시행 추진

○ 유지관리

- 관수, 제초작업 실시로 수목 조기활착 유도

○ 2007년도 사업 대상지 기초조사

- 아파트, 학교 등 40여개소

지정 보호수 주변정비 및 쉼터조성사업

○ 보호수 외과수술로 불량한 생육여건을 개선하고 주변       환경을 정비하여 시민들의 휴식공간 제공

□ 사업개요

○ 지정보호수 : 26개소 (은행나무7, 느티나무9, 왕버들7, 기타3)

○ 사 업 비 : 500백만원 (보상비 120, 시설비 380)

○ 사업규모 : 토지매입 1,722㎡, 정자및편의시설 15개소, 생육환경개선 22주

○ 사업기간 : 2006년 ~ 2008년(3개년)

□ 추진실적

○ 지정보호수 실태 일제조사 : 2005년도 상․하반기(2회)

○ 지역주민과의 간담회 : 2006. 3. 10

○ 사업대상지 선정(6개소) : 2006. 3. 24

○ 지정보호수 정비사업(1차년도)

- 대 상 지 : 6개소(취향정,왕능휴게소,경기전,용복동,호성동,조촌동)

- 사업규모 : 주변환경개선, 외과수술, 영양공급, 휴게시설 3조 등

- 사 업 비 : 68백만원

- 사업기간 : 2006. 5. 11 ~ 7. 7

○ 보호수 외과수술 및 제초제 중화처리사업 추진

- 위    치 : 서완산동 기령당, 평화동 대정마을, 호성동 봉암마을

- 수종 및 수량 : 3주 (느티나무 2, 왕버들 1)

- 사업규모 : 외과수술,토양중화처리,영양공급,표지판 2개소 등

- 사 업 비 : 12백만원

- 사업기간 : 2006. 8. 1~ 9. 5

□ 금후계획

○ 보호수 정비사업 시행지에 대한 보호와 사후관리

- 생육상태, 관리실태점검 : 수시

산불방지 최소화 대책 및 산림사업 추진

○ 산불발생 사전예방태세 확립 및 초동진화체제 구축 피해        최소화 및 조림 ․ 육림사업의 적기 실행으로 시민에게

쾌적한 숲 제공

□ 현    황

○ 임야면적 : 6,504ha

○ 조림사업 : 7ha (73백만원)

○ 숲 가꾸기 사업 : 235ha  142백만원

○ 산불인력 및 장비 : 감시․진화 156명, 3,611점 (진화차량 등)

□ 추진실적

○ 산지조림 : 7ha / 66백만원 (큰나무조림 2, 지역특색녹화 5ha)

○ 숲 가꾸기사업 : 106ha

- 덩굴제거 83ha, 풀베기 9ha, 어린나무가꾸기 14ha 등

○ 봄철 산불방지 추진 : ‘06. 2. 1 ~ 5. 15 (104일간 발생건수 0건)

- 산불방지대책본부 설치운영 : 3개소 (본청, 양 구청)

- 감시 30개소, 진화대 16개대, 상황 및 순찰 등 169명 배치

- 공중진화 공조체제 구축  ➩ 가용헬기 8대(산림청5,군부대2,소방1)

- 산불예방 캠페인 및 산림피해 기동단속 실시 : 20회

- 산불예방 홍보물(경고판, 현수막등) 적재적소 설치 : 13,744점

- 산불취약지 인화물질 제거 완료 : 487개소 55.2㎞

○ 가을철 산불방지대책본부 설치운영  : ‘06. 11. 1 ~ 12. 15 (45일간)

□ 금후계획

○ 숲 가꾸기사업 추진 완료 : 2006. 12. 10.

○ 병해충(소나무재선충병 등) 조기예찰 및 적극적 방제

삼천 녹색관광자원 조성사업

○ 도심속 생태환경을 복원하고 하천 생태계와 인간과 어우        러지는 도심속 체험형 자연학습 녹색관광 자원화 추진

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 삼천천 일원 (세내교 ⇔ 추천대교)

○ 규    모 : 10.3㎞  [3개구간 : 세내교 ~ 우림교(1.3),

우림교~서곡교(5.1), 서곡교~추천대교(3.9)]

○ 사 업 비 : 2,800백만원 (균특 1,400 도비 360, 시비 1,040)

○ 사업내용 : 수질정화습지 및 수변식물식재, 자연학습 체험공간조성 등

○ 사업기간 : 2005년 ~ 2007년 (3개년)

□ 추진실적

○ 삼천 녹색관광자원 조성사업 설계 : 2005. 9.~2006. 1.

○ 전문가 의견수렴 (푸른전주 추진위원회) : 2005. 12. 22

○ 공사발주 : 2006. 4. 14

○ 녹색관광자원 조성사업 - 1차년도

- 사 업 량 : 1.3㎞

- 위    치 : 삼천동 세내교~효자동 우림교 구간 (1.3㎞)

- 사 업 비 : 400백만원 (균특 200, 시비 200)

- 사업내용 : 수변녹지조성 (물억새 등 8종 135천본 식재)

- 사업기간 : 4. 14 ～ 7. 13

□ 금후계획

○ 관수 등 필요한 조치로 조기활착 : 식재지 유지관리

○ 2007년도 사업 추진을 위한 예산확보 : 2,400백만원

- 균특 1,200, 도비 360, 시비 840

완산 생활체육공원 조성사업

○ 체육시설 확충으로 시민의 생활체육 활성화를 통한       건강증진 및 정서함양에 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 중인동 모악산 인접 어두제일대

○ 사업규모 : 45천평 (축구, 테니스장 등 10종 34개시설)

○ 총사업비 : 190억원 (보상비 56, 공사비 134)

○ 사업기간 : 2001년 〜 2008년 (8개년)

□ 추진실적

○ 예산확보 : 157억원 (국10, 교4, 도8, 시135), 미확보 33억

○ 편입토지 보상 (126천㎡ 56억원) : 98% 보상완료

○ 공사 총액발주 (토목, 건축, 기계) : 7,120백만원

- 2004년 까지 (750백만원) : 축구장, 주차장 부지조성 및 기반조성

- 2005년 추진 (3,100백만원) : 축구장 1면, 테니스장 16면 조성완료

○ 문화유적 발굴완료, 보존계획 수립추진중

□ 금후계획

○ 3차분 계약및 시공 : 진입로,주차장,화장실,테니스장 락카룸 등

○ 기반조성 마무리에 따른 조경공사 발주

- 기 완공된 축구장 1면과 테니스장 16면은 2007년 개장          을 위하여 노력

덕진공원 제방길 산책로 조성사업

○ 연꽃, 창포, 음악분수, 경관조명이 어우러진 덕진공원        제방길을 산책로를 조성 휴식공간 확대 관광명소화

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 덕진동 덕진공원내 제방길

○ 사업규모

- 산책로 조성 :  L= 450m, B= 1.5m ~ 4.5m

- 차도 정비 : 1차선(5m) ⇒ 2차선(6m) 확장

○ 사 업 비 : 550백만원

○ 사업기간 : 2006. 5. ~ 11.

□ 추진실적

○ 덕진공원 제방길 산책로 조성사업 실시설계및 심사 - ‘06.2.9~4.21

○ 전문가 의견수렴(푸른전주추진위원회) ------ 2006. 2. 28

○ 지역주민공청회 및 의견수렴 (덕진동사무소) - 2006. 3. 3

○ 도로확장 및 인도설치 완료 (L= 350m, B= 7.0m~8.0m)

○ 제방길 산책로변 가로등 설치 완료 (2등용 : 차도, 보도)

□ 금후계획

○ 수목등 및 경관조명 시설공사는 2007년도 본예산 확보 시행

등산로 정비사업 및 시설물 보수

○ 등산로를 찾는 시민 급증으로 무분별한 등산로 개설을 방지      하여 자연훼손 및 재난재해를 방지하여 안전하고 쾌적한        등산로 확보로 시민건강증진 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 중인동 모악산공원 및 덕진구 인후동 기린공원

○ 사업규모 : 등산로 정비 L=27Km (모악산 22, 기린공원 5)

○ 총사업비 : 566백만원 (모악산공원 366, 기린공원 200)

○ 사업기간 : 2004. 12월 ～ 2006. 9월

□ 추진실적

❏ 모악산 도립공원 등산로 정비공사 ------------- 완공

○ 공사기간: ‘04.12 ~’06. 7. 30

○ 사 업 비 : 366백만원

○ 사업개요 : 비단길 등 6로선  L=22km

- 전망대 1개소, 목교 2개소, 테크시설 11개소, 로프난         간 1,204m, 야외탁자 7개소, 평의자 45개소, 이정표 45개소

현황판 3개소, 공중화장실 1동(금곡사),방부목 계단 1,204m

❏ 기린공원 등산로 정비공사 --------------------- 완공

○ 공사기간 : 2005. 10. 4 ～ 2006. 9. 25

○ 사 업 비 : 180백만원

○ 사업개요 : 등산로 정비 5km

- 정상부~약수터간 데크계단, 약수터 정비, 방부목 계단,

로프난간, 이정표, 배수로 정비, 평의자, 체련시설

□ 금후계획

○ 2007년도 본예산 확보하여 등산로 정비 지속추진(300백만원)

- 황방산외 4개공원 등산로 및 시설물 정비

- 등산로 입구 만남의 광장 등 조성