제240회 전주시의회 임시회

도  시  건  설  위  원  회

2007년도

주요업무계획

교    통    국

보   고   순   서

□	일 반 현 황		-------	1
□	부 서 별 주 요 기 능		-------	2
□	기 본 현 황		-------	3
□	주요업무 추진계획		-------
	○	교통행정과	-------	7
	○	교통시설과	-------	14
	○	도로과	-------	23
	○	재난안전관리과	-------	47
	○	하수관리과	-------	54
	○	차량등록사업소	-------	63

일  반  현  황

□ 기   구 : 5과 1사업소 22담당

																					교 통 국
	교통행정과 (4 담 당)							교통시설과 (3 담 당)								도 로 과 (4 담 당)											재난안전 관 리 과 (4 담 당)							하수관리과 (3 담 당)							차량등록 사 업 소 (4 담 당)
	교통행정							교통시설								도로행정											민 방 위							하수행정							등 록 1
	대중교통							경 전 철								도로시설											재난관리							하수시설							등 록 2
	교통지도							교통정보								도로정비
																											복구지원
																																		하수정비							보험지도
	주차장관리															도로경관											하천관리														건설기계

□ 정‧현원 현황(정원 100명, 현원 98명)

과 별		총 계	일 반 직						계약	기능
			4급	5급	6급	7급	8급	9급
계	정 원	100	1	6	21	33	17	3	2	17
	현 원	98	1	5	21	47	5	1	1	17
교통행정과	정 원	18	1	1	4	10	1			1
	현 원	17	1	0	4	10	1			1
교통시설과	정 원	16		1	2	4	2		2	5
	현 원	15		1	2	5	1		1	5
도 로 과	정 원	15		1	4	4	5			1
	현 원	15		1	4	8	1			1
재난안전관리과	정 원	14		1	4	7	1			1
	현 원	14		1	4	7	1			1
하수관리과	정 원	12		1	3	5	2	1
	현 원	12		1	3	7	1	0
차량등록사업소	정 원	25		1	4	3	6	2		9
	현 원	25		1	4	10	0	1		9

□ 부서별 주요기능

과 별	분 장 사 무
교통행정과	○ 교통종합계획 수립 ○ 대중교통(버스, 택시, 화물) 업무 추진 ○ 자동차운송사업체(버스, 택시, 화물 등) 지도감독 ○ 공영주차장 확충 및 관리, 교통영향평가업무
교통시설과	○ 도로교통 안전시설물 설치 및 유지관리 ○ 어린이 보호구역 정비사업 추진 ○ 경전철 사업 추진 ○ 전라선 복선화 사업 ○ 시내버스 정보화사업(BIS) 추진 및 운영관리 ○ 지능형 교통체계(ITS) 추진 및 운영관리
도 로 과	○ 도로부지관리, 도로안내표지판 설치관리 ○ 도로포장 보수지도, 자전거도로 시설, 가로등관리 ○ 신규도로개설 및 용지보상, 도시가로망 확충사업 ○ 가로환경 및 노점상 지도단속, 자전거이용 활성화
재난안전관리과	○ 민방위 계획수립 및 추진 ○ 재난방재 종합계획수립 및 시행, 재난재해대책추진 ○ 자연하천조성사업, 하천관리(국,공유재산 관리)
하수관리과	○ 하수도 공기업특별회계 운영 ○ 하수도 정비기본계획 수립 및 시행 ○ 하수관거정비사업 추진 ○ 하수종말처리시설 운영관리
차량등록사업소	○ 자동차 등록(전산입력, 자료관리 및 증명발급 등) ○ 자동차 및 건설기계 과태료부과 ○ 건설기계등록(전산입력, 증명발급,검사최고, 정비명령 등) ○ 무보험차량조사(손해배상보장법위반 과태료, 범칙금부과 등)

□ 기본현황 - 2006. 12. 31 현재

○ 운수업체

(단위 : 개소/대)

구 분	계	버 스			택 시		화 물		렌트카	특수 여객
		시내	시외	관광	회 사	개 인	회 사	개 인
업 체 수	180	5	5	19	25		78		34	14
보유대수	9,904	398	431	364	1,599	2,253	1,747	1,907	1,171	34

○ 교통안전 시설물

(단위: 개소, 개)

교차로	신호등(개소)			제어기	보행자 음 향 신호기	보행자 잔 여 표시기	교 통 표지판	차 선	횡단 보도	횡단보도 조 명 등
	소계	LED	전구
431	431	247	184	381	64	447	8,808	849개노선 L=402㎞ 차선L=2,010km	1,707	102개소366등

○ 도    로

(단위 : 개소, ㎞)

구 분	계		고속국도		일반국도		지 방 도		시 도
	노선	연 장	노선	연 장	노선	연 장	노선	연 장	노선	연 장
총연장	850	407	1	5	5	62	3	22	841	318
포장도	850	407	1	5	5	62	3	22	841	318
포장율 (%)		100		100		100		100		100

※ 도로율 : 16.28%(도로면적/시가지면적)

○ 교량 및 기타 시설물

(단위 : 개)

구분 계	교 량					육교 보도	지하 보도	지하차도	터널	비 고
	소계	고속 국도	시의 국도	지방도	시도
122	103		34	3	66	6	6	5	2

※ 장대교량(삼례교 : 570m,  회포대교 : 707m)

○ 옥외광고물 현황

(단위 : 개)

광고업자 등록현황	시 지 정 광 고 시 설				비 고
	계	게시대	벽보판	기 타
430	515	150	365	-

○ 하    천

(단위 : ㎞)

구 분		개소	하천연장	제 방 연 장			개수율 (%)	비고
				계	기개수	미개수
계		24	100.5	177.7	141.3	36.4	79.5
법정하천	소 계	21	94.5	164.9	134.9	30.0	81.8
	국가하천	3	14.4	28.8	28.8	-	100.0
	지방 1급	2	19.8	39.6	38.6	1.0	97.5
	지방 2급	16	60.3	96.5	67.5	29.0	70.0
소 하 천		3	6.0	12.8	6.4	6.4	50.0

○ 하 수 도

구 분		처리구역 (㎢)	계획연장 (㎞)	시설연장 (㎞)	미시설연장 (㎞)	보급율 (%)	비고
계		69.9	2,141	1,331	810	62.2
합 류 식		18.9	661	661	0	100.0
분류식	소 계	51.0	1,480	670	810	45.3
	오수관거	-	856	372	484	43.5
	우수관거	-	625	298	327	47.7

○ 하수․위생처리 시설

구 분	하 수 처 리	위 생 처 리
위 치	덕진구 송천동 2가 1130번지
시설용량	1일 처리능력 ⇨ 403,000㎥ - 1단계 시설 : 103,000㎥ - 2단계 시설 : 200,000㎥ - 3단계 시설 : 100,000㎥	1일 처리능력 ⇨ 290㎘ - 분 뇨 : 30㎘ - 정 화 조 : 260㎘
처리방법	1․2단계 표준 활성 슬러지법 3단계 고도처리(CSBR) 공법	하수 연계처리 (1994년부터 시행)

○ 차집관로

하 천 명	연 장 (㎞)	맨 홀 (개)	우수토실 (개소)	환기구 (개소)	여수토실 (개소)
계 (6개노선)	71.8	1,010	251	73	5
전주천 (좌, 우안)	30.0	369	142	37	4
삼 천 (좌, 우안)	13.4	155	45	18
금암천 (좌, 우안)	2.9	82	38	9
아 중 선	11.4	174	16	4
팔복선(공장,생활)	10.8	183	8	5	1
상 관 라 인	3.3	47	2

○ 자동차등록

(단위 : 대)

합 계	승 용 차	승 합 차	화 물 차	특 수 차
209,024	157,605	12,492	38,607	320

교통행정과 소관

ꊱ	화산로 - 백제로 버스노선 확충 ---------	8
ꊲ	고객중심의 대중교통 체계 확립----------	9
ꊳ	한 쪽 면 주차하기 운동 추진 ------------	10
ꊴ	불법 주정차 단속 효율성 제고 ----------	11
ꊵ	만남의 광장 조성 사업 -----------------	12
ꊶ	녹색 주차장 확장 사업 -----------------	13

화산로-백제로 버스노선 확충

○ 백제로와 화산로에 버스노선을 확충하여 팔달로와 연계된 내부

순환버스 동선체계를 확립하여 주민 생활편의 도모

□ 사업개요

○ 대상노선 : 화산로(꽃밭정이사거리) ~ 백제로(전주역)

○ 사업기간 : 2006. 12 ~ 2007. 12

○ 총사업비 : 1,000백만원

○ 사업내용 : 시내버스 노선체계 정비 및 연차별 적자보전

□ 그간 추진상황

○ 2006년도 순환버스 및 무료환승제 시행 : 2006. 3. 15

○ 순환노선 체계 운영실태 분석 : 2006. 3. 15 ~ 6. 14(3개월)

- 이용객 감소추세 둔화(도입전 감소율 3%, 도입후 1.2%)

○ 시민단체 등 의견수렴 : 편리한 제도로 확대시행 요청(2006. 8)

□ 문제점 및 대책

○ 화산로 백제로 버스운행 증회시 교통수요가 적어 업계 경영난 가중 우려

➩ 적자보전을 전제로 시행시 가능하나 추가 재정지원 지난

○ 운행 적자가 심한 노선 개편시 완주군 협의 진통 예상

➩ 노선조정시 설득과 인센티브(요금할인 등) 부여 등 방안 모색 추진

□ 금후계획

○ 시내버스 2단계 노선조정 : 2006. 12 ~ 2007. 2

○ 도․농 연계 운행체계 이원화[전주⇔완주군(면)⇔마을] : 2007

- 교통량 조사 및 노선개편(안) 마련(시민 의견수렴, 완주군 협의 등)

- 불합리한 노선 체계 정비(적자노선 감차 포함)

고객중심의 대중교통 체계 확립

○ 자가용 자동차의 증가로 교통정체가 지속되어 정시성 결여

등으로 수송효율 저하 및 원가상승에 따른 경영적자 누적

○ 대중교통 이용 우대정책 부족, 승용차 이용 증가 및 교통 혼잡

□ 사업개요

○ 시내버스 이용율 제고를 위한 기반 조성

- 대중교통 인프라 구축 ➩ 버스도착안내시스템(BIS) 확대 등

○ 고객 중심의 합리적 노선 조정 및 환승제 확대 : 2개노선 16대

○ 운수업체 재정지원(유가보조금, 재정지원금 등) : 39,501백만원

□ 그간 추진상황

○ 버스정보시스템 구축

- 승강장 안내기 136개, 노변 기지국 193개, 차량내 안내기 94개

○ 순환버스 및 무료환승제 시행 : 2006. 3. 15

- 무료환승객 이용실적(2006. 11월말 현재) : 1,841천명

- 교통카드 이용율 : 9.2% 증가(시행전 40%➩시행후 49.2%)

□ 금후계획

○ 교통카드 이용율 제고(이용율 70%까지 향상)

○ 버스정보시스템 확대

- 승강장 안내기 286개, 노변 기지국 383개, 차량내 안내기 410개

○ 대중교통계획․연차별시행계획 수립 및 제도개선(2007~2010)

○ 버스업체 표준운송원가 관련 용역

- 경영분석 및 노선별 표준원가 산정, 적자노선 실차 조사

○ 고객 중심의 노선조정 및 무료환승제 확대(2007년 상반기)

- 야간 학생 수요, 공휴일 운행 등 맞춤 노선 개발 및 탄력 배차

○ 운수업체 적기 지원으로 경영개선 및 이용 서비스 향상

- 재정지원, 유류보조금, 대․폐차 지원, 벽지노선 손실보상 등

○ 준공영제 시행을 위한 버스개혁추진위원회 구성(15인 내외) 검토

한 쪽 면 주차하기 운동 추진

○ 차량의 급증에 따른 주차시설 부족으로 주택가 이면도로의 불법

주정차로인한 주민통행불편과 교통사고위험이 존재하고

○ 소방차 구급차 등 긴급차량의 통행에 막대한 지장을 주고 있어

주민참여에 의한 한쪽면 주차하기 운동을 전개하고자 함

□ 사업개요

○ 운영지역 : 시범지역 6개소(구청별 3개소)

○ 운영방법 : 자율지역과 강제지역으로 구분 운영

- 자율지역 : 중앙 황색 실선

- 강제지역 : 한쪽차선은 백색차선, 반대쪽 차선은 황색점선

○ 운영주체 : 각 동 주민자치위원회

○ 사 업 비 : 70백만원

□ 금후계획

○ 시범 운영지역(10km정도) 예정지 조사 ------ 2007. 2

- 주    관 : 각 동(주민자치위원회)

- 선    정 : 자율 운영지역과 강제 운영지역 구분

○ 추진방법

- 자율적인 방법 : 주민자치위원회 주관

- 강제적인 방법

․주민의견 수렴 후 대상지역 선정 추진

․경찰서 협의후 한쪽 차선은 주차 백색차선, 반대쪽 차선은 황색 점선

․한쪽면 주차의 불법 주․정차 차량에 대한 강력한 단속 실시

○ 시범지역 6개소(구청별 3개소) 심의 선정 운영 - 2007. 5

○ 자율지역 : 중앙 황색 실선

○ 강제지역 : 한쪽차선은 백색차선, 반대쪽 차선은 황색 점선

불법 주․정차 단속의 효율성 제고

○ 터미널‧시내버스 승강장 주변 및 주요 간선도로의 불법 주․정차로 인하여 시내버스 운행 및 교통체증 발생

○ 취약지역 시간대의 효율적인 불법 주․정차 단속을 실시하여 교통체증 해소

□ 운영현황

○ 단속구간 ---------------- 258개 구간 194.8km

- 금지구역 : 201개 구간 161km,  - 견인지역 : 72개 구간  68.7km

○ 단속인력 및 차량 : 63명(차량 16대)

○ 단속반 운영

- 아침 :  2개조  4명,    - 야간 : 4개조 12명

- 주간 : 14개조 42명,   - 휴무 : 4개조  8명

○ 무인단속시스템 운영 ------ 9개소(완산 7, 덕진 2)

□ 그간 추진상황

○ 무인단속시스템 확대 설치 --------------- 20개소

- 주요간선도로, 대형유통시설․예식장, 민원다발지역

○ PDA를 활용한 단속시스템 운영 --------- 28대

○ 교통 서포터스 운영 --------------------- 12개 구간 100명

- 운영실적 : 56,036건(계도, 이동조치, 안내)

○ 교통사고 줄이기 캠페인 추진 ------------ 2006. 9~11

- 참여실적 : 3,858명(공무원 및 경찰, 단체,어린이 등)

□ 금후계획

○ 무인단속시스템 확대 설치 -------------- 20대 800백만원(도비 25%)

※ 불법 주․정차 없는 거리 조성 : 동부시장⇔충경로사거리(1.4km), 8대

○ 교통서포터스 운영 ----------------------- 200명(반기별 100명)

○ 교통사고 줄이기 캠페인 추진(매주 화요일) - 연중

○ 지역실정에 맞는 불법 주․정차 단속의 탄력적 운영 - 연중

○ 터미널, 시내버스 승강장 주변 불법 주․정차 근절 -- 연중

만남의 광장 조성 사업

○ 전주를 찾는 방문객에게 만남의 장소 및 휴식공간 제공

○ 전주에서 타지역으로 출퇴근하는 직장인에게 주차공간 제공 및

만남의 장소 마련

□ 사업개요

○ 위    치 : 4～6개소(동․서․남․북 방향)

- 무․진․장, 정읍․고창, 남원․임실, 군산․익산, 봉동․고산방면

○ 사업기간 : 2006～2010년(5년)

○ 총사업비 : 6,000백만원(2006투자-368, 2007계획-1,128)

○ 사업내용 : 주차장, 휴게시설, 쉼터, 조경

□ 그간 추진상황

○ 남원․임실 방면 조성 완료 ─── 2005. 12 ～ 2006. 9

- 위    치 : 완산구 색장동 부남마을

- 면    적 : 2,596㎡(주차면수 : 68면)

○ 봉동․고산 방면 공사 추진 ─── 2006. 12 ～ 2007. 2

- 위    치 : 덕진구 호성동 차량등록사업소 옆

- 면    적 : 986㎡(주차면수 : 30면)

□ 금후계획

○ 무․진․장 방면 부지선정 매입후 조성계획 수립 및 시행 - 2007.1～12

○ 정읍․고창, 군산․익산 방면 만남의 광장 조성계획 수립 - 2007.1～2

- 전문가 및 시민단체, 카풀 이용 시민 등 의견 수렴

- 각 방면 조성 규모, 사업추진 방법 등 결정

○ 도시계획시설결정인가 등 관련절차 이행 ---- 2007. 3～5

○ 년차별 계획에 의거 조성 사업 추진  ------- 2007 ～ 2010

녹색 주차장 확장 사업

○ 도심 열섬 현상 해소 및 푸른 녹색 도시 건설

○ 주택가의 심각한 주차난 해소를 위하여 주택의 담장을 허물어

여유공간을 주차시설과 녹지공간으로 조성

□ 사업개요

○ 사업대상 : 기존 주차장 270개소(공영 6, 민영 264)

녹색주차마을 조성 2개소

○ 사업기간 : 2007년

○ 총사업비 : 1,120백만원

- 녹색 주차마을 조성(2개지구) : 1,000백만원

- 기존 주차장 녹색 주차장 시설 :   120백만원

○ 사업내용

- 기존 주차장 : 주변 및 내부 조경 식재

- 신설 주차장 : 친환경적인 포장자재 활용 및 조경 식재

- 녹색 주차마을 조성 : 담장 허물기 후 주차장 조성 및 조경

□ 그간 추진상황

○ 녹색주차장 조성 --------------------------- 2001 ～ 2006

- 모악산, 한옥마을(2), 삼천도서관, 가련산공원, 카풀주차장(2)

○ 중기 지방재정계획 수립 및 투․융자 심사 --- 2006. 4

○ 녹색주차마을(그린파킹) 설계 사전심사 의뢰 - 2006.12

□ 금후계획

○ 녹색 주차장 조성 금후계획 수립 ------- 2007. 1~2

○ 전주시 주차장 조례 개정 -------------- 2007. 3~4

- 민영주차장 : 조경 비용 30% 정도 지원

- 녹색 주차마을 조성 : 주차 1면당 500만원 정도 지원

○ 녹색 주차장 조성 사업 추진 ----------- 2007 ~

- 1단계 : 경기전 주차장,  - 2단계 : 신설 주차장 친환경적  포장 및 조경 식재

○ 녹색 주차마을 시범지역(2개소) 조성 --- 2007. 2 ~ 10

- 사업내용 : 담장 허물기 후 주차장 조성 및 조경

※ 시범지역 조성후 주민 활용도 및 반응 등 감안 확대 추진

교통시설과 소관

ꊱ	어린이 보호구역 개선사업 --------------	15
ꊲ	사고잦은지점 교차로 개선사업 ----------	16
ꊳ	LED 신호등 교체 설치 사업 -----------	17
ꊴ	차선 도색(재도색) 사업 ----------------	18
ꊵ	교통안전시설 확충 및 정비사업 ---------	19
ꊶ	신호등 설치․이설 집약화 사업 ----------	20
ꊷ	교통사고 줄이기 본부 설치운영 ---------	21
ꊸ	교통 정보․신호 시스템 효율적 운영관리 --	22

어린이 보호구역 개선사업

○ 교통약자인 어린이를 안전사고로부터 보호하기 위한 통학로

교통안전시설 확충 및 정비

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2003~2007(1단계 사업)

○ 총사업량 : 중앙초교 외 58개교

○ 총사업비 : 9,395백만원(국비 50%, 시비 50%)

○ 2007년 사업량 : 16개교  2,842백만원

- 2006 명시이월 : 2,086백만원(국 579, 시 1,507)

- 2007년 본예산 :   756백만원(국 378, 시   378)

□ 그간 추진상황

○ 2006년까지 실적 : 43개교  6,553백만원

구 분	계	2003	2004	2005	2006
사 업 량 (개소)	43	6	9	15	13
사 업 비 (백만원)	6,553	1,461	1,020	2,200	1,872

□ 문제점 및 대책

○ 학교 주변상가 반대로 공사지연 및 공사중 잦은 설계변경 발생

□ 금후계획

○ 명시이월사업(2,086백만원) 12개교 ------ 2007.6  완료

○ 2007년 사업 (756백만원)  4개교 ------- 2007.9  완료

사고잦은지점 교차로 개선사업

○ 년간 중대형 교통사고 5건 이상 발생장소 사고원인을 분석,

사고 재발생 방지를 위한 개선 사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 사고잦은지점 2개소(색장동 커브길 및 용머리길 커브길)

○ 사업내용 : 차량감속 유도시설 및 안전시설 보강, 개선

○ 사 업 비 : 110백만원(국비 50%, 시비 50%)

□ 2006년 추진상황

○ 사 업 량 : 서신동 광진아파트 4거리 1개소 완료

○ 사 업 비 : 92백만원

□ 문제점 및 대책

○ 매년 경찰청 및 도로교통 안전관리공단에서 사고잦은지점을 지정 분석하여 안전시설 확충을 요구하고 있으나 예산부족으로 완벽한 시설 보강 미흡

➩ 선진 안전시설 도입 설치 및 시민 교통문화 의식 개선을 위한 홍보, 교육, 캠페인 등 교통사고 줄이기 운동 전개

□ 금후계획

○ 지정된 장소 개선을 위한 전문가 및 관련기관 자문 - 2007. 1

○ 설계발주 입찰 ------------------------------ 2007. 2

○ 공사 착공 및 준공 -------------------------- 2007. 3~6

LED 신호등 교체 설치 사업

○ 전력소비 및 고장이 많은 전구식 신호등을 LED 신호등으로 교체

- 고장발생 70% 감소로 유지보수비 절감 및 전력료 85% 감소

- 태양빛에 의한 난반사 현상 해소 및 양호한 시인 - 사고25%감소

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2002~

○ 교체대상 : 352개소 4,165등

○ 사 업 비 : 8,000백만원(국비 6,198, 시비 1,802)

○ 2007 계획 :

- 사 업 량 : 23개소

- 사 업 비 : 343백만원(국비 240, 시비 103)

□ 그간 추진상황

○ 사 업 량 : 168개소 완료(48%)

○ 사 업 비 : 1,463백만원

□ 문제점 및 대책

○ 에너지 절감 대책의 일환으로 산업자원부에서 연차적 계획에 의한 사업비를 지원함에 따라 사업기간이 장기간 소요

➩ 년간 200백만원 정도의 전력료 및 유지보수비 예산이 절감되고 있으나 우리시 재정을 고려할 때 국비지원금에 시기를 맞춰 시행

□ 금후계획

○ 연도별 계획에 의한 사업 추진

○ 설계 발주 단가계약 입찰 ---------------- 2007. 2

○ 공사추진 ------------------------------- 2007. 2~12

차선 도색(재도색) 사업

○ 차선 재도색 시기 기준에 의한 사후 유지관리 철저로 교통

사고 방지 및 도로 미관 향상

□ 사업개요

○ 차선현황 : 849로선, 차선길이 2,010km, 횡단보도 1,707개

○ 사업내용 : 18개로선, 차선길이 400km, 횡단보도 500개

○ 사 업 비 : 1,425백만원(도색 1,300. 지우기 125)

□ 2006년 추진상황

○ 사 업 량 : 15개로선, 차선길이 310km, 횡단보도 463개

○ 사 업 비 : 1,050백만원

□ 문제점 및 대책

○ 차선 평균수명은 주요간선도로 및 교차로는 1년, 기타 도로는 2년 이하인데 예산부족으로 주요도로 3년, 이면도로 6년 주기로 재도색

※ 국도유지관리사무소의 경우 1년 1회 재도색

○ 차선이 지워진 곳에서 사고 발생시 피해자, 가해자가 바뀔 수 있고 지워진 차선이 사고에 영향을 끼쳤을 경우 손해배상 책임 발생

➩ 연차적으로 사업비를 증액 확보 누적된 재도색 주기 단축

➩ 신규 및 재포장 도로는 차선 수명이 긴 2액형으로 도색하도록 지침 수립

□ 금후계획

○ 연도별 계획에 의한 추진 및 민원요구 장소 우선시행

○ 설계 발주 단가계약 입찰 -------------- 2007. 2

○ 공사추진 ----------------------------- 2007. 2~12

교통안전시설 확충 및 정비사업

○ 주의․지시․규제․보조 등 교통표지판 및 반사경․규제봉․갈매기․표지병․안전휀스 등 시선유도 교통안전시설 확충 및  정비로 교통사고 예방

□ 사업개요

○ 시설현황 : 표지판 8,808개, 시선유도시설 88,879개

안전휀스 등 안전시설 6,200m

○ 사업내용 : 표지판 설치 및 보수 200개

시선유도시설 설치 및 보수 2,000개

○ 사 업 비 : 200백만원

□ 2006년 추진상황

○ 사 업 량 : 표지판 365개, 시선유도시설 1,829개, 안전휀스 1,850m

○ 사 업 비 : 400백만원

□ 문제점 및 대책

○ 교통안전시설 관련 민원 년간 560건 접수 및 사업비 부족

➩ 년초에 단가입찰 계약으로 여러 장소의 수시민원 신속처리

➩ 부족예산 추경 확보 사업추진(200백만원)

□ 금후계획

○ 민원요구 장소 우선시행

○ 설계 발주 단가계약 입찰 --------------- 2007. 2

○ 공사추진 ------------------------------ 2007. 2~12

신호등 설치․이설 집약화 사업

○ 안전사고가 많이 발생하는 교차로내 신호등 설치․이설 및

개선으로 사고를 감소시켜 시민의 인명과 재산보호

○ 교차로내 많은 시설물이 난립 설치되어 도시미관 저해 및

보행공간 불편을 해소하기 위하여 통합 설치

□ 사업개요

○ 시설현황 : 신호등 431개 교차로

○ 사업내용

- 신호등 설치 및 이설, 집약화, 횡단보도 조명보수 - 16개교차로

○ 사 업 비 : 500백만원

□ 그간 추진상황(2002 ~ 2006)

○ 신호등 설치 및 이설, 집약화, 횡단보도 조명보수 - 184개교차로

○ 사 업 비 : 2,650백만원

□ 문제점 및 대책

○ 신호등 설치요구 민원은 많으나 경찰서 교통규제심의위원회에 상정 결과에 따라 우리시가 설치함으로 모든 민원 수용 불가

➩ 단가입찰 계약으로 신호등 설치기준에 의한 민원사항은 신속 처리

➩ 신호등 신설 및 이설시 집약화 병행 추진

- 이중설치 방지로 예산절감(교차로당 10백만원)

□ 금후계획

○ 연도별 계획에 의한 추진 및 민원요구 장소 우선시행

○ 설계 발주 단가계약 입찰 -------------- 2007. 2

○ 공사추진 ----------------------------- 2007. 2~12

※ 집약화 : 신호등 + 가로등 + 보행등 + 교통표지판 + 도로표지판 + 공공안내표지판

교통사고 줄이기 본부 설치운영

○ 민,관,단체가 함께하는 선진교통문화 의식 교육과 홍보, 캠페인 등

교통사고 줄이기 운동을 종합적으로 수행하는 구심체 필요

○ 교통사고 OECD선진국 수준으로 감소시키기 위한 여건마련

- 자동차 1만대당 사망자 목표 2.0인 이하(현 3.3인)

□ 사업개요

○ 목    적

- “우리지역의 교통사고는 우리지역민이 나서서 예방하자”는  사회적 공감대 형성 - 지역주민 동참유도 시민 모두가 스스로

교통법규를 지켜나가는 선진교통문화 분위기 조성

○ 구     성 : 12개 유관단체

- 시.경찰서, 교육청, 교통방송, 신문사, 손보협회, 도로교통안전관리공단,

교통안전공단, 운전자협의회, 안전생활실천시민연합, 서포터스, 녹색어머니회

○ 역    할

- 우리지역 교통사고 발생원인, 유형, 특성 등을 분석 사고 예방법 홍보

- 재발생 방지, 캠페인 등을 종합적 수행하는 구심체 역할

- 교통법규 위반자에게 법규준수 당부 “사랑의 편지쓰기” 전개

- 사고 예견지역의 신고접수 및 우수사례(제안) 공모 시책반영

- 교통약자에 대한 안전교육 프로그램 도입 운영

․어린이 안전교육 : 정보센터 교육장 활용 및 초등학교, 유치원 찾아가 교육

․노인 안전교육 : 동 자치센터 및 노인정 활용

․어르신 안전지도자 양성 : 소정의 교육 이수 후 지역 교통사고 예방활동 활용 - 노인 일자리 제공

○ 소요사업비 : 140백만원

□ 금후계획

○ 유관단체 간담회 -------------------- 2007. 1

○ 발대식 ----------------------------- 2007. 2

○ 교통사고 줄이기 운동 전개 ---------- 2007. 3~12

교통 정보․신호 시스템 효율적 운영관리

○ 교통정보․신호 시설물의 증가 및 장비 노후화로 장애 발생

➩ 전문업체 용역 관리

○ 신속․정확한 교통상황 정보제공 및 효율적 운영으로 시민편익 증진

□ 사업개요

○ 사 업 비 : 600백만원

○ 사업내용

- 교통신호시스템 유지관리 용역

․대상 : 주전산장치, 교통상황판, 전용회선, 신호제어기 381대, CCTV 39개소, 가변안내전광판 19개소, 차량검지기40개소

- 교통신호 DB구축 및 관리 용역

․내용 : 교통량 조사, 현시방법 및 현시값 조정, 주기조정, 연동값 조정

- 시내버스안내 정보분야 유지관리 용역

․대상 : 승강장안내기 136개소, 노변기지국 233개소, 노선번호 표시기 410대, 차량단말기 410대, 차량안내단말기 94대

□ 문제점 및 대책

○ 교통시설물의 첨단장비 증가 및 기존 시설물 노후화

○ 교통정보․신호 시설물 유지관리 전문인력 부족으로 장애 발생시 즉시 조치 불가 - 시민불편 초래

➩ 전문업체에 유지관리 용역(관리업체 24시간 대기)

□ 금후계획

○ 유지관리 용역 발주 --------------- 2007. 1

○ 유지관리 용역 시행 --------------- 2007. 2~2008. 1

도 로 과  소 관

ꊱ	남부순환도로 개설 --------------------	24
ꊲ	전주 진입로 확장 ----------------------	25
ꊳ	원대한방병원~가련교간 도로개설 -------	26
ꊴ	동산고가교 접속도로 확장 -------------	27
ꊵ	대학로 개설 관련 전북대 시설지원사업 ---	28
ꊶ	세내길(우림교~포스코) 개설 -----------	29
ꊷ	전통문화가 어우러진 남천교 가설 --------	30
ꊸ	한옥마을 테마관광로(은행로) 조성 ------	31
ꊹ	법원~동아한일APT간 도로개설 ---------	32
	서남권 국도대체 우회도로 건설 ---------	33
	북부권 국도대체 우회도로 건설 ---------	34
	전주~논산간 고속도로 확장 ------------	35
	전주~광양간 고속도로 건설 ------------	36
	익산~전주~장수간 고속도로 건설 -------	37
	쑥고개길(국도1호선) 확장 --------------	38
	도로안내 표지판 정비 ------------------	39
	관내 외곽지역 가로등 신설 -------------	40
	주요도로 가로등 조도개선 --------------	41
	지하차도 및 터널 조도개선사업 ---------	42
	전주천 교량 야간경관 조명 설치 ---------	43
	중앙 분리대 설치 ----------------------	44
	아름다운 교량 및 터널 만들기 용역 ------	45
	소송 패소 토지 및 미불용지 매입 --------	46

남 부 순 환 도 로  개 설

○ 서남권 지역의 교통량을 외곽으로 분산시켜 도심교통난 해소

○ 외곽 도로망 구축으로 주변의 발전 기틀 및 교통편익 제공

□ 사업개요

○ 구    간 : 서서학동 공수교～동서학동 좁은목

○ 사 업 량 : 연장 1,560m, 폭 25～35m

○ 사 업 비 : 36,800백만원(보상 21,600. 공사 15,200)

○ 사업기간 : 1998 ～ 2008(11년)

□ 그간 추진상황(전체공정 50%)

○ 공수교～거산황궁ⓐ～무궁화주유소간 공사완료 - 1998. 1～2005. 9

○ 장승로~공수교(150m)간 부분개통 --- 2005.10～2006. 5

○ 교대뒤 이주세대 건물철거 완료(49동) - 2006. 3～2006. 9

○ 전일연립주택(가동/15세대중 9세대 보상) - 2006.10～2006.12

※ 투자액 : 21,557백만원(기투자 18,557, 2007년 3,000)

□ 문제점 및 대책

○ 산성천~좁은목(420m) 건물노후로 누수 및 붕괴위험 조기 보상 요구

➩ 주민 안전사고를 해소코자 잔여 사업비(15,243백만원) 조기 확보

□ 금후계획

○ 전일연립주택 및 교대뒤 보상마무리 ---- 2007. 1~2007.10

○ 거산황궁@~좁은목(910m) 구간 보상 및 공사 - 2008. 1~2008.12

전주 진입로 확장

○ 우리시 관문인 전주진입로 확장으로 쾌적한 도시환경 제공

○ 미확장 구간 도로확장으로 병목현상 및 교통체증 해소

□ 사업개요

○ 구    간 : 원대한방병원～팔복동 BYC

○ 사 업 량 : 연장 1,320m, 폭 35⇒50m

○ 사 업 비 : 17,000백만원(보상 10,000. 공사 7,000)

○ 사업기간 : 1999 ～ 2008(10년)

□ 그간 추진상황(전체공정 71%)

○ 원대한방병원～추천대교간 확장개통(710m) - 1999. 1～2003.12

○ 추천대교～BYC(하행선 610m) 확장완료 - 2004. 3~2006.12

※ 투자액 : 13,986백만원(기투자 11,986, 2007년 2,000)

□ 문제점 및 대책

○ 추천대교～BYC간 상행선 미 확장으로 병목현상 초래 및 사업 장기화로 지역주민 불만 팽배

➩ 병목현상 해소를 위하여 잔여사업비(3,014백만원) 조기 확보

□ 금후계획

○ 추천대교~BYC(상행선 610m) 보상 ----- 2007. 1~10

○ 추천대교~BYC 전 구간 공사마무리 ------ 2008. 1~12

원대한방병원~가련교간 도로개설

○ 하가택지개발사업 시행으로 도로 기반시설 확충 절대 필요

○ 북부권과 서남권을 연결하는 주요도로 개설로 교통난 해소

□ 사업개요

○ 구    간 : 덕진동 도립국악원 ～ 덕진동 가련교간

○ 사 업 량 : 연장 1,400m, 폭 35m

○ 사 업 비 : 27,000백만원(보상 10,000, 공사 17,000)

○ 사업기간 : 2005 ～ 2008(4년)

□ 그간 추진상황(전체공정 8%)

○ 실시설계 및 도시계획 변경결정(광장축소) - 2003.11 ～ 2005. 8

○ 편입토지 보상(5필지/3,948㎡) ----- 2005. 8 ～ 2005.12

○ 1차공사 시행(택지개발구간 L=300m) - 2006. 5.～ 2006.12

※ 투자액 : 12,060백만원(기투자 2,060, 2007년 10,000)

□ 문제점 및 대책

○ 대절토부 암 발파시 소음․진동으로 입원환자 피해 발생 우려

□ 병원 및 지역주민과 사전 협의 방호․방음벽 설치후 시행 민원 최소화

※ 하가택지 : 13만평(토지공사, 2005.8.9～2008.2월말)

□ 금후계획

○ 도립국악원~하가택지경계(1100m) 보상추진 -- 2007. 1~2007. 6

○ 대절토부 암 절취 및 택지개발지구 성토 - 2007. 5~2007.12

○ 전 구간 도로개설 완료 --------------- 2008. 1~2008.12

동산고가교 접속도로 확장

○ 동산고가교 접속도로 진,출입부 미 확장으로 병목현상 초래

○ 도로확장으로 교통사고 위험 해소는 물론 차량소통 원활 기여

□ 사업개요

○ 구    간 : 동산동 동산고가교 ～ 동산역

○ 사 업 량 : 연장 340m, 폭 18.5 ⇒ 35m

○ 사 업 비 : 2,990백만원(보상 1,700, 공사 1,290)

○ 사업기간 : 2003 ～ 2007(5년)

□ 그간 추진상황(전체공정 53%)

○ 상행선 확장공사 완료 ------------------- 2005. 3～ 5

○ 하행선 부분확장 완료(340m중/100m완료) - 2006. 3～ 5

- 용수로 복개 L=20m, 상ㆍ하수도 L=538m ,인도 L=100m

○ 하행선 일부구간(70m) 암거 및 포장완료 - 2006.10～12

※ 투자액 : 2,990백만원(기투자 1,590, 2007년 1,400)

□ 금후계획

○ 편입토지 분할측량 및 보상 -------------- 2007. 1 ~ 3

○ 미 확장 전 구간(L=240m) 마무리 ------ 2007. 3 ~ 9

대학로 개설 관련 전북대 시설지원사업

○ 도시가로망 확충을 위한 대학로 개설내 국유지 대체시설지원

○ 국유지사용 대체시설 협약체결 사업으로 행정의 신뢰성 제고

□ 사업개요

○ 구    간 : 전북대학교내

○ 사 업 량 : 대운동장보수 1식, 학군단증축 106평,

동물병원후면 배수Box L=30m(3×2×2련)

○ 사 업 비 : 2,069백만원(21필지 31,470㎡)

○ 사업기간 : 2004～2007(4년)

□ 그간 추진상황(전체공정 65%)

○ 대학로내 국유지사용 대체시설 협약체결 ----- 2003.12.22

- 지원사업 ’06년까지 완료할 것임을 협약

○ 학군단 방음벽시설 완료 -------------------- 2004.12.20

○ 대운동장 보수공사 완료 -------------------- 2006. 2~6

※ 투자액 : 2,069백만원(기투자 1,340, 2007년 729)

□ 금후계획

○ 잔여공사(학군단 증축, 배수BOX) 마무리 --- 2007. 3~7

세내길(우림교~포스코) 개설

○ 대단위아파트 밀집지역의 진출입로 미개설로 교통체증 심각

- 아파트 1,527세대가 2005년 9월부터 입주 시작

○ 서부신시가지와 연계되는 주요 노선으로 도로개설이 시급함

□ 사업개요

○ 구    간 : 효자동 우림교～포스코 APT 앞

○ 사 업 량 : 연장 350m, 폭 25m

○ 사 업 비 : 4,700백만원(보상 1,600. 공사 3,100)

○ 사업기간 : 2006 ～ 2008(3년)

□ 그간 추진상황(전체공정 11%)

○ 이동교~포스코@(L=700m) 개설 ---- 2004.12～2007.5

○ 분할측량 및 실시설계용역 추진 ------- 2006. 2～2007.3

○ 보상협의 추진(5필지) ---------------- 2006. 3～2006.8

※ 투자액 : 1,100백만원(기투자 500, 2007년 600)

□ 문제점 및 대책

○ 아파트 밀집지역으로 주 간선도로가 미개설로 교통정체 등 주민 불편 심화

□ 주민불편이 해소될 수 있도록 부족사업비(3,600백만원) 조기확보

□ 금후계획

○ 실시설계 완료 및 용지보상 ------------ 2007. 3~2007. 6

○ 잔여구간 보상 및 공사추진 완료 ------- 2008. 1~2008.12

전통문화가 어우러진 남천교 가설

○ 한옥마을ㆍ한벽루등 자연형 하천과 어우러진 특색있는 교량  가설로 가장 한국적인 전통문화도시의 이미지 부각

○ 통과ㆍ연결기능에서 쉬어가는 휴식공간을 확보 주변 환경과  조화를 이루도록 하여 천년전주 상징화

□ 사업개요

○ 구    간 : 은행로~전주천좌안도로 연결교량

○ 사 업 량 : 연장 80m, 폭 15m

○ 사 업 비 : 7,600백만원(공사 7,600)

○ 사업기간 : 2006 ~ 2008(3년)

□ 그간 추진상황(전체공정 6%)

○ 한옥보존위원회 및 설계자문위원회 자문 - 2004. 1~2004.9

○ 선진도시견학 및 특색있는 교량검토 ----- 2006. 1~2006.9

○ 시의회 도시건설위원회 간담회 --------- 2006.12.21

※ 투자액 : 5,050백만원(기투자 500, 2007년 4,550)

□ 문제점 및 대책

○ 옛 교량 역사 고증자료 미흡으로 정통성 확보에 어려움

□ 풍속, 고고학 전문가, 역사박물관 자료를 실시설계시 충분히 반영

□ 금후계획

○ 전문가 자문 및 실시설계용역 -------- 2007. 1~2007. 8

○ 공사 착수 및 완료 ------------------ 2007. 9~2008.12

한옥마을 테마관광로(은행로) 조성

○ 한옥마을을 찾는 국내외 관광객들의 안전한 보행권 확보

○ 가장 한국적인 전통문화 이미지를 반영 관광명소로 부각

□ 사업개요

○ 구    간 : 교동 남천교～동부시장

○ 사 업 량 : 연장 980m, 폭 8 ⇒ 12m

○ 사 업 비 : 9,500백만원(보상 4,500, 공사 5,000)

○ 사업기간 : 2005 ～ 2007(3년)

□ 그간 추진상황(전체공정 34%)

○ 도시계획변경결정(폭15⇒12m) ------- 2005. 8.26

○ 실시설계 주민설명 및 의견수렴(양방통행) - 2006. 1.11

○ 착공 및 이주건물철거(대상30/25동완료) - 2006. 4～2006. 9

○ 미협의자(4세대)토지수용 신청 및 재결 - 2006. 9~2006.12

※ 확보액 : 9,500백만원(보상 4,500, 공사 5,000)

□ 문제점 및 대책

○ 2007. 12월말 준공을 위해 전 구간 교통통제 불가피

□ 공정에 따른 구간별 부분통제로 주민불편 최소화

□ 금후계획

○ 미 협의자 보상금 공탁 및 행정대집행 ------ 2007. 1~2

○ 도로확장 완료 및 개통 -------------------- 2007. 3~12

법원~동아한일APT간 도로개설

○ 구도심과 신시가지 연결교량 가설로 지역경제 활성화

○ 덕진․서신동 일대 도심교통난 해소 및 낙후지역 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 구    간 : 덕진동 법원～서신동 동아한일APT

○ 사 업 량 : 연장 248m, 폭 25m(교량 118m, 도로 130m)

○ 사 업 비 : 11,000백만원(보상 3,000, 교량 및 도로공사 8,000)

○ 사업기간 : 2004 ～ 2007(4년)

□ 그간 추진상황(전체공정 85%)

○ 롯데백화점 입점에 따른 도로개설 협약체결 -- 2004. 5. 14

○ 교량가설착공 및 준공(접속도로 미완료) - 2005. 3～2006. 4

○ 미협의자(4세대) 토지수용 재결신청 ------- 2006. 9. 4

○ 자라목 토지소유자 행정심판 청구 ------- 2006.12. 7

○ 전라북도 지방토지수용위원회 개최 ------ 2006.12.26

※ 투자액 : 11,000백만원(민자 8,000, 시비 3,000)

□ 금후계획

○ 미 협의자 보상금 공탁 및 행정대집행 ----- 2007.1~2007.2

○ 접속도로 개설 마무리 및 개통 ------------ 2007.2～2007.4

서남권 국도대체 우회도로 건설

〈계속 ․ 국가사업〉

○ 시가지를 통과하는 국도1호, 17호, 27호선과 지방도 712호,

716호, 749호선의 교통량을 분산하여 시내권 교통정체 해소

○ 서남부지역 원활한 물동량 이동의 중심기능을 강화함으로써   지역개발 촉진 및 광역도시 발전기반 구축

□ 사업개요

○ 구    간 : 완주군 상관 ∼ 구이 ∼ 이서 ∼ 용정 ∼ 익산시 춘포

- 완공예정 : 구이∼용정(2008년), 용정∼춘포(2010년)

○ 사업규모 : 33.4km(폭 20m) ※ 전주시 구간 13.4㎞

○ 사 업 비 : 4,676억원(국비 4,368, 시비 308)

○ 사업기간 : 1998 ∼ 2010(13년)

○ 시 행 청 : 익산지방국토관리청(보상 : 전주시)

□ 추진상황(전체공정 81%)

○ 공사 및 보상 투자액 : 3,782억원(국비 3,542, 시비 240)

- 보상실적 ----- 777필지 841,970㎡(86%)

○ 상관 ∼ 구이간(L=8.9㎞)개통 - 2005. 4. 20

○ 구이 ~ 춘포간(L=24.5km) --- 보상 및 공사 추진중

□ 금후계획

○ 2007년 공사 및 보상비 확보 : 342억원(국비 307, 시비 35)

- 이서~춘포 구간 보상실시(시비) : 135필지 223,194㎡

※ 용지보상 완료 : 약 33억원 정도 소요

북부권 국도대체 우회도로 건설

〈계속 ․ 국가사업〉

○ 시가지 통과 국도17, 27호선 교통량 분산으로 시내권 교통정체 해소

○ 북동부지역 원활한 물동량 이동의 중심기능을 강화함으로써   지역개발 촉진 및 광역도시 발전기반 구축

□ 사업개요

○ 사업구간 : 조촌 용정∼아중역(1단계)∼동서학동 색장리(2단계)

- 1 단계 : 2003 ∼ 2011(9년)

- 2 단계 : 2020년까지(전주~광양간고속도로 교통수요 예측 후 개설)

○ 사업규모 : L= 18.6km, B= 20m(전주시 구간 : 11.77㎞)

○ 사 업 비 : 3,040억원(국비 2,790, 시비 250)

○ 시 행 청 : 익산지방국토관리청(보상 : 전주시)

□ 그간 추진상황

○ 업체선정(대우 40%, SK 20%, 도내업체 40%) - 2006. 5. 30

○ 공사계약 및 교량 구조물 공사 착공 ------ 2006. 6. 28

○ 교량가설 예정지 하천점용허가 취소 ------ 22필지 11,436㎡

○ 편입용지 분할측량 완료 ----------------- 977필지 634,707㎡

- 국유지(407필지, 168,896㎡), 사유지(570필지 465,811㎡)

□ 문제점 및 대책

○ 용지보상비 예산 미확보

➩ 교량가설 하천부지(소양천, 전주천)에 우선 구조물 설치 등 공사 추진하고, 추경에 예산 확보 용지보상 실시

□ 금후계획

○ 2007년 공사비 확보 : 105억원(국비)

- 교량 가설 구조물 설치 및 용지보상(완주군 구간) 실시

전주∼논산간 고속도로 확장

〈계속 ․ 국가사업〉

○ 천안∼논산간 고속도로 개통에 따른 교통정체 해소

○ 논산∼전주간, 전주∼광양간, 익산∼장수간 고속도로 연결로 물류비용 절감

○ 행정수도 연계 교통망 구축으로 지역균형발전의 활성화 도모

□ 사업개요

○ 구    간 : 전주 ～ 삼례 ∼ 논산간

○ 사업규모 : 연장 17.0km, 폭 4차로 ➩ 6∼8차로

○ 사 업 비 : 3,500억원(국비)

- 삼례～논산 구간 사업비 : 2,143억원

○ 사업기간 : 2002 ∼ 2008(7년)

○ 시행기관 : 건설교통부(한국도로공사)

□ 그간 추진상황 --------- 262억원(국비)

○ 공사발주 및 착공 -------------------- 2005.12.27

○ 삼례∼논산 구간 공정 : 12%

※ 전주∼삼례간은 현재 추진중인 익산∼장수간, 전주∼광양간

고속도로 개통 후 통행량 추이를 검토하여 시행여부 결정

□ 금후계획 -------- 300억원 정도(2007년)

○ 편입용지 보상 및 공사 추진중

※ 준공예정 : 2010년(2005년 착공, 절대공기 부족으로 공기연장 불가피)

전주∼광양간 고속도로 건설

〈계속 ․ 국가사업〉

○ 군장산업단지와 광양만 산업단지의 연결도로망 구축 시급

○ 호남고속도로 및 익산∼장수간 고속도로의 연결로 고속도로

이용율 제고 및 산업 경쟁력 증진

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주 ∼ 남원 ∼ 광양간

○ 사업규모 : 연장 117.8km(전주시 구간 7.78㎞)

○ 사 업 비 : 28,231억원(국비)

○ 사업기간 : 2003 ∼ 2011(8년)

○ 시 행 청 : 건설교통부(한국도로공사)

□ 그간 추진상황(전체공정 5.1%) ------ 1,443억원(국비)

○ 기본 및 실시설계․환경영향평가 등 행정절차 완료 - 2003. 12

○ 전주～남원구간(60.7㎞) 공정 : 25%(2004.12.30착공)

□ 문제점 및 대책

○ 우아동 삼거마을 주민민원 발생

- 진입로 고가교량에 대하여 조망이 확보되고 외관이 수려한

상징성 있는 장대교량 설치 요구

※ 도로공사 협조 공문 발송(2006.12.7), 건교부 방문(2006. 12. 15)

➩ 2007. 1~2월중 검토 계획(도로공사)

□ 금후계획 -------------------- 2,747억원(2007년)

○ 편입용지 보상 및 도로 축조공사

※ 준공예정 : 2010년(1년 조기완공 : 광양만 배후도로망 구축)

익산∼전주∼장수간 고속도로 건설

〈계속 ․ 국가사업〉

○ 군․장 산업단지 등 서해안 공업지대와 동․남해안 공업지대를

연결하는 도로망 구축으로 물류비용 절감

□ 사업개요

○ 위    치 : 익산 ∼ 전주 ∼ 장수간

○ 사업규모 : 연장 61km, 폭 4차로

○ 사 업 비 : 12,164억원(국비)

○ 사업기간 : 2001 ∼ 2008(8년)

○ 시 행 청 : 건설교통부(한국도로공사)

□ 그간 추진상황(전체공정 90%) --- 10,116억원(국비)

○ 용지보상 완료

○ 도로축조 및 구조물 시공

○ 건축공사 등 기타공사 시행중

□ 금후계획 ------------------- 2,048억원(2007년)

○ 편입용지 보상 및 도로 축조공사 추진

※ 준공예정 : 2007.12월말(1년 조기완공)

쑥고개길(국도1호선) 확장

〈신규 ․ 국가사업〉

○ 도심을 통과하는 시관리 국도 1호선 확장으로 교통정체 해소

○ 서부지역 신흥 개발권과 구도심권의 연결 교통망 확장으로

지역간 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 위    치 : 우림교 ∼ 안행교 사거리

○ 사업규모 : 연장 0.63km, 폭 25m ➩ 35m

○ 사 업 비 : 70억원(국비)

○ 사업기간 : 2005 ∼ 2008(4년)

○ 시행기관 : 건설교통부(대한주택공사)

□ 그간 추진상황 ---------- 15억원(국비)

○ 실시설계 용역발주 ------------------ 2005.7∼2006.2

○ 도시계획시설사업 실시계획 승인 ----- 2006. 5.18

○ 편입용지 보상 ---------------------- 2006. 12

□ 금후계획 --------------- 40억원(2007년)

○ 공 사 착 공 ------------------------- 2007. 8

○ 준공 및 기부체납 -------------------- 2008. 12

- 안행교 사거리~효자광장 구간 확장은 효자 주상복합건물 신축 교통영향평가 협의 의견 제출

도로 안내 표지판 정비

○ 전주를 찾는 방문객․통행인에게 쉽고 편리한 목적지 안내에

기여 및 아름다운 도시가로망 조성

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 관내

○ 사업규모 : 『도로표지규칙』에 의한 도로 표지판 정비

- 공공시설 이전, 도로개설 등 변경사항 반영 및 민원 요구에 따른 정비

- 건교부 국도1호 도로안내표지판 5개년 정비계획에 의한 정비

○ 총사업비 : 120백만원

○ 사업기간 : 2007. 1 ∼ 2007. 12

□ 그간 추진상황

○ 사업개요

- 표지판 신설 및 정비 : 150개소(수정 137, 신설 9, 철거 3, 이설 1)

○ 사 업 비 : 150백만원

○ 공사기간 : 2006. 5. ~ 2006. 9(5개월)

□ 금후계획

○ 관내 각 기관 의견수렴 ------------- 2007. 1월중 실시

○ 사업개요 : 표지판 정비 120개소 정도

※ 신속한 민원처리를 위해 단가계약으로 추진

관내 외곽지역 가로등 신설

○ 관내 외곽지역 및 가로등 미설치 노선에 가로등 신설

○ 교통사고 예방 및 밝은 밤거리 조성으로 주민 불편해소

□ 사업개요

○ 위    치 : 상림선, 백석로, 장동로, 호성로, 전미선, 중인선

삼례로, 용진로, 남고로, 구이선 등

○ 사업내용 : 외곽지역 가로등(한전주 이용) 신설

○ 사 업 량 : 가로등 80개소 신설(L= 1,600m)

○ 사업기간 : 2007. 2 ～ 12

○ 사 업 비 : 100백만원

□ 그간 추진상황

○ 상림선, 백석로 가로등 51개소 설치 완료 ---- 2005. 10

○ 장동로, 호성로 가로등 77개소 설치 완료 ---- 2006. 11

□ 금후계획

○ 민원발생지역 및 교통사고 잦은 노선 순으로 연차적 지속 추진(전미선, 중인선, 삼례로 중점 추진)

주요도로 가로등 조도개선

○ 팔달로, 충경로, 기린로등 구도심 주요도로 가로등의 조도를      개선하여 구도심 활성화 및 시민의 야간통행 불편해소

□ 사업개요

○ 위    치 : 팔달로, 충경로

○ 사업내용 : 기존 가로등을 철거 후 신규 설치

○ 사 업 량 : 가로등 75개소 교체(팔달로 양방향 L= 900m)

○ 사업기간 : 2007. 2 ～ 2007. 9

○ 사 업 비 : 300백만원

□ 그간 추진상황

○ 주요도로 가로등 야간조도 실태 조사 ---- 2006. 9~10

○ 가로등 조도개선 추진계획 수립 --------- 2006. 11

□ 문제점 및 대책

○ 팔달로 등 주요도로의 가로등은 20~30년전 도로개설과 함께 설치

○ 인도방향 보행등이 없고, 시설 노후로 조도개선 한계가 있음.

➩ 노후 가로등 철거하고, 조도기준(30룩스)에 맞게 신규 설치하여 야경이 아름다운 밤거리 조성

□ 금후계획

○ 유동인구가 많고, 어두운 노선 순으로 연차적으로 지속 추진 (팔달로, 충경로 시내 중심가 우선 추진)

지하차도 및 터널 조도개선사업

○ 관내 지하차도 및 터널의 조명이 어둡다는 민원이 빈번하게 발생

○ 지하차도 및 터널 내부의 조도를 밝게 개선하여 운전자에게

밝고 안전한 차량운행

□ 사업개요

○ 위    치 : 남고과도교, 진북, 어은터널, 서신, 송천, 안덕원

월드컵로, 대학로 지하차도

○ 사업내용 : 조도불량 램프 및 노후선로 교체

○ 사 업 량 : 지하차도 2개소 조도개선

○ 사업기간 : 2007. 2 ～ 2007. 12

○ 사 업 비 : 100백만원

□ 그간 추진상황

○ 남고과도교 조도개선공사 완료 ------------ 2005. 11

○ 진북.어은터널 조도개선공사 완료 --------- 2006. 12

□ 금후계획

○ 민원발생지역 및 교통사고 잦은 노선 순으로 연차적 지속 추진 (안덕원, 월드컵로, 송천, 대학로 지하차도 중점 실시)

전주천 교량 야간경관 조명 설치

○ 자연형 하천과 어우러진 아름다운 도시야경을 조성하여

천년전주 전통문화도시 이미지 부각

○ 다양한 칼라조명에 의한 아름다운 빛을 연출하여 관광객과

시민에게 볼거리 제공

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주천 백제교(2006.11.정책조정회의시 선정)

○ 사업내용 : 교량 조형물 및 야간 경관조명 설치

○ 사업기간 : 2007. 1 ～ 2007. 8

○ 사 업 비 : 300백만원(특별교부세)

□ 그간 추진상황

○ 전주천 야간경관조명 설치 특별교부세 신청 및 배정 - 2006. 4~ 8

○ 선진지 경관조명 사례 조사 및 설치방법 검토 - 2006. 9~10

○ 야간경관조명 설치대상 선정 및 추진계획수립 - 2006.11

□ 문제점 및 대책

○ 백제교 등 대다수 교량은 특색있는 조형 구조물이 없어 조형물을 설치하지 않을시 경관조명 설치효과 미흡

➩ 예산범위내(3억원)에서 실시하되 교량 난간에 조각 및 문양을 붙여 특색 있는 야간 경관 연출

□ 금후계획

○ 설계 실적업체 제한입찰 ----------------- 2007. 1～2

○ 실시설계용역 및 공사발주 --------------- 2007. 3~4

○ 공사착공 및 완료 ----------------------- 2007. 5～8

중 앙  분 리 대  설 치

○ 중앙선 침범 및 무단횡단으로 인한 도심교통사고 예방

○ 도로중앙화단 수목식재로 녹색가로환경 조성 및 도심 열섬

해소 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 교통사고 잦은 주요 간선도로(4차선 이상 도로)

○ 사업규모 : 41개 노선 61.6㎞

○ 총사업비 : 13,500백만원(국비 6,750, 시비 6,750)

○ 사업기간 : 2002 ～2011(10년)

□ 그간 추진상황

○ 중앙분리대 정비계획 수립 ------------------- 2003. 6.

○ 사 업 량 : 15개 노선 23.9㎞

- 화단형 15.6㎞,  - 방호형 4.0㎞,  - 수벽 4.3㎞

※ 투자액 : 7,033백만원(기투자-6,777, 2006년-256)-52.1%

□ 문제점 및 대책

○ 2006년도 월드컵로, 장동로 중앙분리대 경계석 설치 및 화단 성토(가로수 미식재) : 2.4㎞

➩ 2007년도 녹지공원과 “도시 숲 조성사업” 으로 조경수 식재

□ 금후계획

○ 쑥고개길 중앙 분리대 설치

- 구    간 : 전주박물관 ～ 통계청(연장 0.5㎞)

- 소요예산 : 256백만원(국비 128, 시비 128)

아름다운 교량 및 터널 만들기 용역

○ 설치가 오래된 교량의 난간을 현대적 감각으로 리모델링

하여 전통문화도시 이미지 제고

○ 동.서간 연결터널이 준공 후 10여년이 지나 퇴색되고 어두운

터널을 새롭게 정비하여 안전한 통행유도

□ 사업개요

○ 대상시설물 : 8개소(교량 6, 터널 2)

- 교량 : 백제교, 서곡교, 추천대교, 한벽교, 싸전다리, 우림교

- 터널 : 어은터널, 진북터널

○ 총사업비 : 5,600백만원(시비)

○ 사업기간 : 2007 ～ 2010(4년)

□ 그간 추진상황

○ 용역과제 심의 완료 ------------------- 2006. 10. 24

○ 진북.어은터널 조도개선 사업 완료 ----- 2006. 12. 19

□ 문제점 및 대책

○ 교량 경관조명 및 구조물 설치시 난간 교체가 검토되어야 하며  교량안전진단 등 많은 사업비 소요

➩ 홍산교, 남천교 등 신설 교량부터 시행

□ 금후계획

○ 용역추진 ---------------------- 50백만원

- 기    간 : 2007. 3 ~ 8(6개월)

- 내    용 : 터널벽면 리모델링 대안 제시

리모델링 대상교량 안전진단 및 난간설치 방안 제시

소송 패소 토지 및 미불용지 매입

○ 미불용지 및 소송 패소토지 미 보상으로 장기간 민원이 제기

되어 왔던 토지를 조기 매입함으로서 민원 해소

□ 사업개요

○ 보상대상토지 : 63건 29,250㎡(8,848평)

○ 매입 예상액 : 5,800백만원

○ 사 업 기 간 : 2007 ～ 2010(4년)

□ 그간 추진상황

○ 토지매입비 지급 : 총 37건  2,000백만원

- 2004년도 : 10건   500백만원

- 2005년도 : 11건   500백만원

- 2006년도 : 16건 1,000백만원

□ 문제점 및 대책

○ 소송패소 토지의 보상 지연으로 민원발생

○ 장기 민원 토지부터 우선매입(연차적 보상)

□ 금후계획

○ 소송패소 토지매입 추진

- 소요예산 : 1,000백만원

- 매입대상 : 9건 7,849㎡(2,374평)

재난안전관리과 소관

ꊱ	삼천 자연형하천 조성사업 --------------	48
ꊲ	만경강 생태하천 가꾸기 사업 -----------	49
ꊳ	만경강 수계치수 중복천 개수공사 --------	50
ꊴ	아중천 생태하천조성 및 준설사업 --------	51
ꊵ	맑은 물이 흐르는 건산천 가꾸기 ---------	52
ꊶ	재난 취약계층에 대한 안전복지서비스 강화 --	53

삼천 자연형하천 조성사업

○ 서부지역의 급속한 도시발전으로 삼천 이용객의 급증

○ 수질개선과 생태계 복원 및 각종 편익시설 확대 설치 필요

□ 사업개요

○ 위    치 : 삼천동 삼천교 ～ 팔복동 추천대교

○ 사업규모 : L = 8.05km

○ 총사업비 : 12,441백만원(국비 7,553, 시비 4,888)

○ 사업기간 : 2001 ～ 2007(7개년)

□ 그간 추진상황(전체공정 90%)

○ 기본 및 실시설계 완료 ------------------ 2001. 10. 15

○ 공 사 착 공 ---------------------------- 2001. 12. 31

- 자연형 호안 4.1km, 차집관거 1.6km, 자전거도로 9.7km

- 수질 정화습지 1, 다목적 행사광장 1, 징검다리 4개소

- 체육시설 19개소, 진입개단 5개소, 진출입로 18개소 등

※ 투자액(100%) : 1,783백만원(2006년 계속사업비)

□ 금후계획

○ 어도 2개소, 징검다리 1개소, 하중도 1개소 -- 2007. 3

○ 기타 부대시설 등 사업완공 ----------------- 2007. 4~7

만경강 생태하천 가꾸기 사업

○ 오염된 전주천 하류의 수질개선 및 하천생태계를 복원

○ 전주천, 삼천과 더불어 시민에게 쾌적한 휴식공간을 제공

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 팔복동 추천대교 ～ 만경강 합류부

○ 사업규모 : L= 7.9km(전주천 5.7km, 만경강 2.2km)

○ 총사업비 : 16,637백만원(국 10,772. 도 598. 시 5,267)

○ 사업기간 : 2001 ～ 2010(10개년)

□ 그간 추진상황(전체공정 35%)

○ 기본계획 연구 및 기본설계 --------------- 2001.  4. 24

○ 하천개수 사업 완료(1.9km) ------------- 2003. 12. 31

○ 만경강 생태하천 가꾸기 사업 총괄계약 착공 - 2004. 11. 25

○ 1차~3차분(완료) ------------------------ 2006. 12. 14

- 조경석쌓기 2.6km, 산책로겸 자전거도로 8.76km ,수제설치 2개소

휴게소 3, 운동시설 5, 건널목교 5개소 등

※ 투자액(42%) : 7,026백만원(기투자 5,163, 2007년 1,863)

□ 금후계획

○ 4차분 공사 계약 및 착공 --------------- 2007. 2

○ 공 사 추 진 ---------------------------- 2007. 2～11

- 어도 2개소,  하중도 2개소, 수제 2개소 등

○ 전체사업 준공 -------------------------- 2010. 12

만경강 수계치수 중복천 개수공사

○ 익산지방국토관리청 만경강수계치수 사업으로 선정 위ㆍ수탁 추진

○ 재해 예방과 친환경적인 생태하천으로 조성 시민휴식공간 제공

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 삼천동 쑥고개길 ～ 효자동 삼천합류점

○ 사업규모 : 용지매입 및 하천개수 L=3.5㎞

○ 총사업비 : 32,000백만원(국비)

○ 사업기간 : 2004 ～ 2010(7개년)

□ 그간 추진상황(전체공정 10%)

○ 위․수탁공사 협약 체결(익산청⇔전주시) --- 2003. 6. 9

○ 하천정비시행계획 고시 -------------------- 2005. 8. 2

○ 토지 및 지장물보상 협의 착수 ------------- 2005. 8.20

○ 공사 총괄계약 및 1차분 공사 착공 --------- 2005.10.21

○ 1차분 공사 준공 -------------------------- 2006.10.30

- 축대 및 호안설치 345m, 수로이설 153m

※ 투자액(21%) : 7,000백만원(기투자 3,200, 2007년 3,800)

□ 금후계획

○ 2차분 계약 및 착공 ----------------------- 2007. 2

○ 공사추진 --------------------------------- 2007. 2～12

- 교량 1기, 호안 및 축제 800m, 토지 및 지장물보상 1식

○ 전체사업 준공 ---------------------------- 2010. 12

아중천 생태하천조성 및 준설사업

○ 도심하천인 아중천에 대하여 수질개선및 하천정비 시행

○ 재해사전 예방및 하천생태 환경을 복원하여 시민휴식공간 제공

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 우아동 아중리 복개종점 ～ 소양천합류부

○ 사업규모 : L= 2.88㎞

○ 총사업비 : 4,400백만원(국 2,600, 도 900, 시 900)

○ 사업기간 : 2004 ～ 2008(5개년)

□ 그간 추진상황

○ 실시설계 용역 및 1차공사 완료추진 ----- 2004.3～2005.12

- 실시설계용역(140백만원), 1차공사 552m(190백만원)

○ 총괄분 설계심의 등 행정절차 완료 ------------ 2006. 7. 7

○ 총괄공사 계약 및 1차분공사 착공 ------------- 2006. 9. 7

- 1차분(공정율 50%) : 교량 1기(우정신세계앞),  저수호안공 1,975m

※ 투자액(52%) : 2,330백만원(기투자 1,330, 2007년 1,000)

□ 금후계획

○ 1차분 공사 준공  -------------------------- 2007. 2

○ 2차분 공사 계약 및 착공 ------------------- 2007. 3

○ 공 사 추 진 -------------------------------- 2007. 3～10

- 인도교 가설 1기, 저수호안 자연석 쌓기 1,000m, 토지보상 1식

○  전체사업 완공 ---------------------------- 2008. 12

맑은 물이 흐르는 건산천 가꾸기

○ 건산천을 맑은 물이 흐르는 하천으로, 지역 주민과 함께 조성하여 전주시 관문을 아름답게 가꾸고자 함

□ 사업개요

○ 위    치 : 금암동 시외버스터미널 ~ 전주천 합류점

○ 사업규모 : 미복개구간  L= 875m

○ 총사업비 : 6,350백만원

○ 사업기간 : 2007 ～ 2009(3개년)

□ 그간 추진상황

○ “살기 좋은 지역 만들기”사업 T/F팀 구성 - 2006. 9~11

○ 전주시 용역과제심의위원회 가결 ---------- 2006. 10

○ 건산천 가꾸기 사업 기본방향설정 --------- 2006. 12

※ 2007년 사업비 : 150백만원(설계용역비) 확보

□ 금후계획

○ 실시설계 용역 과업지시서 작성 ----- 2007. 1

○ 용역 발주 및 계약 ----------------- 2007. 2

○ 기본계획 및 실시설계 -------------- 2007. 3 ~ 2007.12

○ 사업추진 -------------------------- 2008. 1 ~ 2009.12

재난 취약계층에 대한 안전복지서비스 강화

○ 국민기초 생활보장 수급자 대부분이 당장 생계유지에 급급      하여 생활안전 문제에 소홀

○ 시민의 생명과 재산을 보호하는 안전도시 구축

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 재난취약계층에 대한 안전복지 서비스 실시

○ 사 업 비 : 20백만원

○ 사업기간 : 2007. 2 ～ 2007.  5

○ 사 업 량 : 1,500 세대

○ 사업내용 : 가정용 소화기 (하론가스) 지급

□ 그간 추진상황

○ 지원대상 세대 조사실시 --------------------- 2006. 12

□ 금후계획

○ 소화기(하론가스) 구입 ---------------------- 2007. 3

○ 소화기 지급 완료  -------------------------- 2007. 5

하수관리과 소관

ꊱ	하수관거정비 민간투자(BTL) 사업 -----	55
ꊲ	화산․덕진처리구역 하수관거 정비사업 --	56
ꊳ	동서학동(원당,객사) 차집관거 설치사업 -	57
ꊴ	송천동(붓내마을) 3단계 차집관거 증설사업 --	58
ꊵ	하수처리 편입구역 차집관거 설치공사 ---	59
ꊶ	하수슬러지 처리시설 설치사업 ----------	60
ꊷ	하수처리장 기존1,2단계 고도처리사업 ---	61
ꊸ	하수처리장 홍보관 설치 --------------	62

하수관거정비 민간투자(BTL)사업

○ 민간자본 유치로 지역경기를 활성화 하고 정화조 폐쇄로 시민부담 경감

○ 오수관거 정비로 하천 수질개선 및 불명수를 차단 하수처리비 절감

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 일원(덕진, 아중, 중앙, 화산, 효자 처리구)

○ 사 업 량 : 하수관거 정비(우․오수 분리) L = 127Km

○ 사 업 비 : 107,361백만원(민간자본)

○ 사업기간 : 2005 ～ 2010(6개년)

□ 그간 추진상황

○ 업무 위․수탁 협약체결(환경부, 도, 시, 환경관리공단) - 2005. 6. 9

○ 시설사업 기본계획고시(민투법 제8조, 10조) - 2005. 6.17

○ 시의회 의무부담행위 동의안 의결 ------------ 2005. 9. 9

○ 민간사업자 사업계획서 평가 및 우선협상대상자 선정 - 2005.10.13

○ 협상 및 사업시행자 지정(전주□랫물길(주)) - 2006. 4. 9

○ 우선시공분 시설사업 실시계획 승인 및 착공 ----- 2006. 4.25

- 우선시공분 L=12.4km중 4.5km 완료  ------- 2006.12.31

□ 금후계획

○ 본 공사에 대한 시설사업 실시계획 승인 및 착공 --- 2007. 3

○ 성과보증(13개월) 및 공사 준공    -------------- 2010. 12

○ 사업시행자 관리 운영(20년간)  ---------------- 2030. 12

화산․덕진처리구역 하수관거정비사업

○ 하수관거 우․오수 분리를 통하여 민간위탁중인 하수처리비 절감

○ 전주천, 삼천 수질개선과 건물 정화조 폐쇄로 시민 보건위생 향상

□ 사업개요

○ 위    치 : 화산처리구역 1․4․7분구, 덕진처리구역 1분구

○ 사업규모 : 우․오수관 분리등 관거정비 L=70㎞

○ 사업기간 : 2004 ～ 2008 (5개년)

○ 사 업 비 : 39,728백만원(국 19,583,  시 20,145)

□ 그간 추진상황(전체공정 62%)

○ 1,2차분(동서학동, 덕진동 부근) L= 11.2Km 공사완료 - 2005. 9. 9

○ 3차분(대학병원, 금평초교) L= 23.0Km 공사완료 - 2006.12.22

○ 4차분(효자택지, 서신2택지) 착공  ------------- 2006. 5. 4

- 계획연장 L= 24.5Km 중 7.3Km 완료(공정 30％)

□ 금후계획

○ 잔여분(L= 11.3Km) 착수 ------------------ 2007. 6

○ 4차분(L=24.5Km) 완료 -------------------- 2007. 12

○ 사 업 준 공 --------------------------------- 2008. 12

동서학동(원당,객사) 차집관거 설치사업

○ 상류 농촌동 지역 발생 오수를 관거설치 차집처리 전주천 수질개선

○ 정화조 폐쇄 차집관거에 직접연결 시민의 보건위생 향상

□ 사업개요

○ 위    치 : 농촌동 3개마을(동서학동 내원당, 외원당, 객사)

○ 사업규모 : 하수관거 정비 L=8.5㎞

○ 사업기간 : 2004 ～ 2008 (5개년)

○ 사 업 비 : 3,364백만원(국 1,682, 도 841, 시 841)

□ 그간 추진상황(전체공정 40%)

○ 사업계획 확정 통보(환경부)    --------------- 2004.12. 7

○ 기본계획 및 실시설계 용역완료    ------------ 2005. 9.12

○ 1차분(동서학동 객사마을 L=1.5Km) 공사완료 -- 2006. 8. 7

○ 2차분(동서학동 객사마을 L=0.7Km) 공사완료 -- 2006.12. 8

□ 금후계획

○ 3차분 계획연장 L= 6.3Km 착공 ------------ 2007. 3

○ 사 업 준 공 --------------------------------- 2008.12

송천동(붓내마을) 3단계 차집관거 증설사업

○ 차집관거의 용량부족으로 우천시 주거지역(송천동 붓내마을)

오수역류 민원해소

○ 전주천, 삼천등 주요 우수토실 개량으로 하천수등 불명수유입

차단으로 민간위탁 운영중인 하수처리비 절감

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 송천동 (우수토실개량 : 전주천, 삼천)

○ 사 업 량 : 차집관거 증설 L= 1.6Km, 우수토실 개량 8개소

○ 사 업 비 : 4,023백만원(국 2,011, 도 1,006, 시 1,006)

○ 사업기간 : 2006 ～ 2007(2개년)

□ 그간 추진상황(전체공정 15%)

○ 기본 및 실시설계 용역 완료 ----------------- 2005.12.30

○ 설계 사전심사 및 공사 발주 의뢰(조달청) ---- 2006. 4.27

○ 공사 입찰 및 착공 -------------------------- 2006. 7. 4

- 우수토실 개량 총 8개소중 6개소 완료

- 추진기지 설치 2개소 및 개착구간 가시설공사중

□ 금후계획

○ 우수토실 개량공사 완료 -------------------- 2007. 5

○ 차집관로 증설 및 사업 준공 ---------------- 2007.12

하수처리 편입구역 차집관거 설치공사

○ 도심하천 상류지역의 생활오수를 차집하여 하수처리장에 유입

○ 공공수역 수질오염 방지로 도심속의 쾌적한 수변공간 제공

○ 농촌동 마을하수도 개량으로 보건위생 증진

□ 사업개요

○ 위    치 : 평화동 장교마을등 54개마을

○ 사 업 량 : 차집관거 설치  L = 12.8km

○ 사 업 비 : 32,100백만원(국 16,050, 도 8,025, 시 8,025)

○ 사업기간 : 2007 ~ 2010(4개년)

□ 그간 추진상황

○ 하수도정비기본계획 전문가 자문 ------------- 2006. 9

- 차집관거를 설치 농촌동 하수도를 직접연결 처리 바람직

○ 2007년도 예산확보(설계비:960백만원) ------ 2006.12

□ 금후계획

○ 기본 및 실시설계 용역착수  ------------------ 2007.01

○ 2008년도 예산신청(국비, 도비) -------------- 2007.04

○ 기본 및 실시설계 용역완료 ------------------- 2007.10

○ 공사 착공 및 완료 --------------- 2008.03 ~ 2010.12

하수슬러지 처리시설 설치사업

○ 국제 해양기구(런던협약)의 하수슬러지 육상매립 금지와(’03. 7)

2012년부터 해양투기 금지가 예상됨에 따라 슬러지의 안정적 처리시설 필요

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 송천동2가 환경사업소 지내(유동적)

○ 사업규모 : 슬러지처리시설(150톤/일)

○ 사업기간 : 2006 ~ 2010(5개년)

○ 사 업 비 : 24,000백만원(국 12,000 도 6,000 시 6,000)

□ 그간 추진상황

○ 환경부 대상사업 확정 ---------------------- 2002.11. 8

○ 기본 및 실시설계 용역 착수 ---------------- 2003. 8.26

○ 용역 중지(공정율81%) --------------------- 2004.12. 6

○ 처리방식 결정을 위해 국내․외 시설견학 ---- 2006.11

□ 금후계획

○ 슬러지 처리시설 입지 및 처리방식 결정 ------ 2007.  2

○ 기본 및 실시설계 용역 재개 ----------------- 2007.  3

○ 슬러지 처리시설 공사 착공 ------------------ 2008.  3

○ 처리시설 시운전 및 사업 완료 --------------- 2010. 12

하수처리장 기존1,2단계 고도처리사업

○ 2001.9월 하수도법 개정으로 강화된 수질기준에 맞게 기존시설 개량으로 만경강등 새만금 유역 수질개선 도모(’04. 1. 1부터 적용)

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 송천동2가 1035번지(환경사업소 내)

○ 사업규모 : 303천톤/일, 고도처리공법(CNR공법)으로 개선

○ 사 업 비 : 60,000백만원(국30,000,  지방비30,000)

○ 사업기간 : 2002. 3 ～ 2007. 4 (6개년)

□ 그간 추진상황

○ 고도처리공사 착공 -------------------------- 2004.10.24

○ 공동구 및 방류펌프장 구조물공사 완료 ------- 2005.10.30

○ 수처리공정 2단계(200천톤) 완료 ------------ 2006.02.28

○ 수처리공정 1단계(103천톤) 완료 ------------ 2006.10.14

- 처리시설 성능운전 : 2006.10.15 ~ 2007.1.14(3개월)

- 수처리 종합시운전 : 2006.10.15 ~ 2007.4.14(3개월)

□ 금후계획

○ 조경, 건축, 포장공사 등 부대공사 완료 ---- 2007. 4

○ 시운전 완료 및 사업 준공 ----------------- 2007. 6

하수처리장 홍보관 설치

○ 하수처리장이 혐오 시설이라는 인식에서 탈피하고 환경보전에

대한 중요성을 일깨우는 체험교육장 및 홍보 공간으로 활용함

으로서 행정의 신뢰감을 갖는 장소로 적극 활용

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 송천동 환경사업소 관리동 내

○ 사업규모 : 전시홀(1층 25평) 및 홍보실(2층 25평) 1식

○ 사업기간 : 2007. 2 ~ 2007. 12

○ 사 업 비 : 500백만원 정도

□ 그간 추진상황

○ 타 지역 홍보시설 자료수집(사천하수처리장 홍보실외 7개소)

○ 일본(호남중부 정화센터), 진해, 언양 등 학생들 대상 적극 홍보중

○ 전주 하수종말처리장 견학 및 방문자 현황

구 분	2005년		2006년		2007년(예상)		비고
	학생	일반	학생	일반	학생	일반	고도처리공사 완료후 증가예상
방문자수	400	200	300	1,200	1,600	1,400

※ 교육청과 협의를 통해 학생들의 교육 과정에 반영 체험공간으로 활용

□ 금후계획

○ 사업계획 수립 완료 ----------------------- 2007. 01

○ 실시설계 용역 발주 ----------------------- 2007. 02

○ 홍보실 공사 착공 ------------------------- 2007. 08

○ 공사완료 및 일반인 개방 ------------------ 2007. 12

차량등록사업소 소관

ꊱ	자동차 정기 무상점검 서비스 실시 ------	64
ꊲ	민원폭주 해소를 위한 집중투입제 실시 ---	65
ꊳ	자동차와 함께 하는『드림팀』 운영 ------	66
ꊴ	자동차 번호판 제작소 행정 지도 --------	67

자동차 정기 무상점검 서비스 실시

○ 자동차 이전등록을 위해 차량등록사업소를 방문하는 차량에 무상

점검 서비스를 실시 자동차 안전운행 의식 고취

○ 매주 금요일에 실시하는 「자동차관련 상담 드림팀」운영 일정에

맞추어 ONE-STOP 행정 서비스 체제 구축 시민만족 행정 구현

□ 사업개요

○ 일시․회수 : 매월 셋째주 금요일(년 12회)

○ 실시기관 : 자동차 3사 정비업체(현대, 대우, 기아)

○ 실시장소 : 차량등록사업소 후정 주차장(2007년 확장 주차장)

○ 점검내용 : 무상점검, 간단한 소모품은 차주 소지 교체 지원 교육

□ 문제점 및 대책

○ 자동차 무상점검 장소 협소로 사업추진 어려움 예상

➩ 차량등록사업소 후정 주차장 조속 완공

○ 방문차량 활용도 저조 예상

➩ 시민 홍보(플래카드 게첨, 언론보도 등) 철저로 다시 찾는 계기 정착화

□ 금후계획

○ 자동차 3사 서비스 센터 협조 출장 점검반 지원 요청

○ 장소와 시간 효율적 운용을 위하여 오전․오후 점검회사 분리

○ 매월 셋째주 금요일 실시 계획 사전 홍보

민원폭주 해소를 위한『집중투입제』실시

○ 자동차 전국 번호판제 시행 및 전북 시․군 차량에 대하여 도내

이전등록이 가능하여 민원인 증가

○ 자동차 등록 민원이 해마다 증가추세에 있음

○ 대기시간 과다소요로 민원인들의 불만으로 민원발생 초래

□ 현    황

○ 일일 민원처리 평균 현황

구 분	계	신 규	이 전	변 경	말 소	압 류	저 당	기 타
월․금요일	4,488	77	268	672	85	1,987	115	1,284
평 일	3,538	51	214	332	55	1,776	92	1,018
증	950	26	54	340	30	211	23	266

○ 평일 20 ～30분 대기, 월․금요일에는 1～2시간 대기

□ 그간 추진상황

○ 전 직원 등록업무(신규․변경․이전) 교육 실시로 민원 해소

➩ 매주 수요일 18:00시 이후 교육 실시

○ 등록업무 창구(신규․변경․이전)직원 유고시 대체 요원 배치

○ 등록업무 창구(자동차매매상사접수용)민원에 대해서 가능인원  집중 투입 처리

○ 대기시간 과다소요로 민원 폭주시 민원처리 직원 추가 배치

□ 금후계획

○ 정례적인 전 직원 업무연찬 실시 : 매주 월요일

자동차와 함께하는『드림팀』운영

○ 차량등록사업소를 찾는 고객을 위하여 자동차와 관련된 궁금증 해결 및 권리보호를 위하여『전문가 상담의 날』을 운영 시민이 대만족 할 수 있도록 최고 양질의 서비스를 제공

□ 현    황

구 분	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일
민원처리건수	5,166	3,147	2,458	3,114	3,809

※ 요일별 평균 처리 3,538건/월요일 5,166건으로 68% 증가

□ 그간 추진상황

○ 상담장소 : 차량등록사업소 상담실

○ 상담일시 : 매주 금요일(10:00~17:30)

○ 상 담 원 : 5명(자동차 전문가 각 1 명)

- 교통안전진흥공단, 전주 자동차 검사소, 보험사,

자동차 매매사업조합, 행정경험이 풍부한 전직 공무원

□ 문제점 및 대책

○ 자원봉사자 생업 종사로 매회 상담 참여 어려움

➩ 부득이 불참여시 전화 상담제 실시

□ 금후계획

○ 차량 유지 관리 및 보수 상담으로 차량 유지비 절감

○ 차량 사고시 대처 방법으로 신속한 사고 처리로 교통체증 감소

○ 사고 예방 및 보험 관련 상담으로 자동차관리법 위반자 감소

자동차 번호판 제작소 행정 지도

○ 자동차 등록번호판 교부 대행 업무를 수행하는 번호판제작소의

운영을 시민이 신뢰하고 적정한 가격을 유지하도록 행정지도

□ 현    황

○ 업 소 수 : 전주번호판제작소 외 6개소

○ 교부매수 : 3,027매/월(2006.1～2006.11월까지)

□ 그간 추진상황

○ 강력하고 지속적인 번호판 교부 수수료 인하

- ’99년도 자율결정 16,500원 ➩ ’06.11월 12,000원

○ 업소별 번호판 가격표 종류별 게첨

○ 소비자 요구할 경우 원가계산서 제시하도록 지도

□ 문제점 및 대책

○ 번호판 가격의 자율화로 가격통제 한계

➩ 강력한 지도감독으로 번호판 가격 인하 유도 및 인상 억제

○ 자치단체에서 번호판가격 상한금액을 정할 수 있도록 자동차  관리법 개정 요청(2006. 10)

□ 금후계획

○ 주기적인 지도점검으로 민원불편 최소화 : 분기별 1회

○ 공무대행인점을 인식하고 서비스에 최선을 다하도록 지도

○ 번호판 가격이 타 도시와 형평성 유지토록 행정지도