제245회 전주시의회 제1차 정례회

도  시  건  설  위  원  회

2007년도

주요업무 추진상황 보고

전주시 상수도사업소

보 고 순 서

□ □ □ □ □	일 반 현 황 -------------- 1 부서별 주요기능 ---------- 2 기 본 현 황 -------------- 3 2007년도 상반기 업무추진 주요성과 -- 7 2007년도 부서별 주요업무 추진계획 -- 8
○	수도행정과 소관			9
○	급 수 과 소관			16
○	수질관리과 소관			26

일 반 현 황

□ 기구 및 인력

○ 기  구  -  3과 10담당(1전산실,1실험소,1센터,17사업장)

																														상수도사업소
					수도행정과																															급 수 과																															수질관리과
	수도 행 정								요금						체납징수							계량기관리															유수율제고							급수시설						누수방지																		생산관리							수질분석										수질관리
		전산실					계량기시험소							누수방지센타						방수리취수장				삼천취수장							원당취수장				전미취수장						상관수원지						대성정수장				지곡정수장			상관정수장				팔복정수장				인후배수지		천마배수지				효자배수지			완산배수지				송천배수지				서신배수지						금암배수지		화산배수지

※ 가압장 8개소      ※ 가동중단 : 9개소

○ 인  력

부서 직급		정원	현 원
			계	수도행정과	급 수 과	수질관리과
합계		88	85	30	21	34
일반직	소계	45	42	15	11	16
	4급	1	1	1
	5급	3	3	1	1	1
	6급	10	10	4	3	3
	7급	18	22	9	3	10
	8~9급	13	6	-	4	2
연 구 사		4	4			4
기 능 직		39	39	15	10	14

※ 청경 16명, 상용26명(300일:15명 280일:11명)

부서별 주요기능

과 별	주 요 업 무	비 고
수도행정과	• 상수도사업소 경영혁신 및 경영평가 • 지방채 및 자치법규 제․개정 • 계약 및 물품관리 • 상수도사용료 부과징수 업무 • 검침업무 위탁관리, 실사 이의신청 처리 • 세입현계, 과오납, 자동납부신청, 환불, 누수감액 • 공기업특별회계 금고계약 및 관리 • 수전관리, 수도계량기 교체 • 계량기 실태조사 및 관리
급 수 과	• 유수율제고 중장기 계획 • 급수공사 신청서 접수 및 승인 • 노후급수관 교체 및 통합공사 • 맑은 물 공급사업 • 배수관 및 급수관 시설공사 • 블록시스템 구축사업 • 누수탐사 및 누수복구 • 누수신고센타 운영관리 및 누수복구작업 • 마을 상수도 유지관리
수질관리과	• 생활용수 수요에 따른 정․원수 확보 • 광역상수도 수급에 관한 업무 전반 • 취․정수장 배수지 등 사업장 시설 유지관리 • 먹는 물 공동시설(지정약수터) 수질검사 • 사업장 시설물 유지관리 • 국가공인 수질검사기관 운영관리 • 공업용수 수급 및 유지보수

기 본 현 황

□ 급수 인구

총인구	급수인구	보급율 (%)	1일 1인 급수량(ℓ)	급수전	유 효 율		비고
					유수율(%)	누수율(%)
명 624,849	명 604,228	96.7	395	187,105	63.1	27.9

□ 수계별 생산 및 급수구역

구 분			시설용량 (천㎥/일)	급수량 (천㎥/일)	급 수 지 역	급수인구	비율 (%)
총 계			388	286		604,228	100
생활용수	합 계		318	238	33개동	604,228	100
	자체상수도	소 계	60	40	7개동	102,143	17.0
		대 성	40	40	동․서서학, 중화산1, 평화1,2동, 완산, 효자1	102,143 (7개동)	17.0
		지 곡	20	-	생산중단
		상 관	20	-	생산중단
	광역상수도	전주권	258	198	중앙,풍남,노송, 서신, 삼천1, 2, 3, 중화2, 평화1.2, 효자2. 3. 4, 진북, 인후1.2.3, 금암1.2, 덕진, 우아1.2, 호성, 팔복, 송천1.2, 조촌, 동산.	502,085	83.0
공업 용수	팔복정수장		70	48	팔복동 1, 2공단		17개 업체공급

※ 생활용수 급수구역은 생산량 및 수요량에 따라 조절

□ 송․배․급수관

단위 : ㎞

총 연 장	송 수 관	배 수 관	급 수 관	비 고
2,033	57	620	1,356

□ 배수지 용량

구 분	배수지(개소)	시설용량(㎥)	비 고
계	11	125,200
	대 성	8,600
자체상수도	지 곡	1,000	가동중단
	완 산	1,000	가동중단
	인 후	30,000
	천 마	30,000
광역상수도	효 자	15,000
	송 천	7,000	가동중단
	서 신	7,000	가동중단
	금 암	7,000	가동중단
	화 산	7,000	가동중단
공 업 용 수	팔 복	11,600

□ 상수원 보호구역

상수도사업장	보 호 구 역			구역지정일	보호시설
	면적(㎢)	상류(Km)	하류(Km)		안내판	표주
계	26.96				42	132
방수리취수장	0.27	1.0	0.5	72. 5. 5.	7	24
상관수원지	25.99 (마치12.00 의암13.99)	전유역		24. 6. 9.	10	26
삼천취수장	0.28	2.2 (독배천0.7)	0.3	82. 6.19.	11	42
원당양수장	0.10	1.0	0.1	80. 8. 4.	6	16
전미취수장	0.32	0.5	0.3	67. 8. 5.	8	24

□ 상수원 수계별 『댐』 저수량

수 원	위 치	만수량(천㎥)	관리기관	비 고
계		817,139
상 관 제	완 주 군	2,139	전 주 시	대성수계보충
용 담 댐	진 안 군	815,000	수자원공사	전주권광역

상수도 공기업 예산

총 규 모 : 78,490백만원

(단위 : 백만원)

세 입			세 출
계 : 78,490(100%)			계 : 78,490(100%)
○ 상수도사업수익 : 62,987(80.2%)			○ 상수도사업비용 : 49,346(62.9%)
◦ 영업수익 : ․ 급 수 수 익 : ․ 급수공사수익 : ․ 기타영업수익 : ◦ 영업외수익 : ․ 예금수입이자 : ․ 타회계전입금 : ․ 기타영업외수익 :	56,942 52,771 3,877 294 6,045 400 5,496 149		◦ 인 건 비 : ◦ 물 건 비 : ◦ 이전경비 : ◦ 급수공사비 : ◦ 지급이자 : ◦ 예 비 비 :	6,499 35,875 1,572 3,003 1,687 710
○ 자 본 적 수 익 : 10,324(13.2%)			○ 자본비용 : 29,144(37.1%)
◦ 고정부채수익 :	9,559		◦ 자본투자비 :	25,160
◦ 자본잉여금수익 :	765		◦ 부채상환금 :	3,784
○ 예 산 외 계 정 : 5,179(6.6%) (과년도계정)			◦ 예 비 비 :	200

2007년도 상반기 업무추진 주요성과

	추진방향
웰빙시대를 맞아 시민의 건강을 위해 살아 숨쉬는 맑은 물 생산 및 공급을 위해서는 상수도운영의 경영혁신과 유수율 제고사업을 최우선 과제로 하여 수도행정의 투명성과 효율성을 제고하여 시민생활불편을 최소화하는 고품격의 상수도 서비스행정 제공.

□ 기본목표

○ 상수도운영의 자구경영 혁신

○ 유수율 향상 제고사업 추진

○ 시민이 신뢰하는 철저한 수질관리

○ 수요자 중심의 상수도 행정서비스 제공

□ 상반기 추진성과

○ 『전국 최초』변방동 지하수 음용세대에 대해 수질검사를 무료       실시하여 수질로 인한 불안감을 해소함으로써 시민들에게 다가가는       상수도 행정서비스 구현

○ 농촌동 지역 주민의 삶의 질 향상을 위해 2008년까지 상수도

100% 공급사업을 적극적으로 추진하고 있으며

○ 시민이 신뢰하는 깨끗하고, 안전한 수돗물을 공급하기 위하여

상수원수의 철저한 수질보전과 선진국 수준의 수질검사를 실시

도내 최초로「수돗물 품질인증제」를 도입 추진.

○ 시민의 건강을 위해 수돗물 고급화로 수요자 중심의 행정혁신       및 기술혁신 등으로 현장행정을 강화하여 시민생활 불편을

최소화하는 고품격의 신뢰행정 구현.

2007년도 부서별 주요업무 추진계획

수도행정과  소관

급 수 과  소관

수질관리과  소관

수도행정과  소관

ꊱ 상수도 검침 및 다량급수처 중점관리 ․․․․․․․․․․ 10

- 도내 최초시행 -

ꊲ 상․하수도 요금「가상계좌」납부추진 ․․․․․․․․․․․․ 11

ꊳ 대형계량기실 확장 및 배관구조 개선 ․․․․ 12-13

ꊴ 노후계량기 교체 추진  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․  14

ꊵ 체납사용료 징수율 제고   ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․   15

상수도 검침 및 다량급수처 중점관리

	추진배경
상수도 요금 검침 관리를 강화하여 정확한 상수도 요금부과 고지로 상수도경영 및 유수율 향상제고.

□ 사업개요

○ 검침관리 강화

- 검침일정준수 및 격감수전 원인규명

- 검침업무 관리감독 강화 및 착오검침 예방 등을 월1회 정기교육

- 비정상 수도계량기의 신속한 교체로 조정량 누락 방지

- 우수 검침원 (통 장) 인센티브 제공

○ 다량급수처 중점관리

- 관리검침 대상 : 월 500톤이상 사용업소

․ 조정량 30%이상 격감수전 등

□ 추진상황

○ 위탁검침원 민원상담 역량강화 및 친절서비스 교육 : 월1회

- 매월 0톤수용가 공가여부 확인 및 검침일자 준수등

○ 비정상 수도계량기 이상유무 확인 및 교체 : 1,036건

○ 다량급수처 일제 점검 : 108개소

- 검침․업종 조정 : 7개소

- 시설봉인 : 7개소

○ 상반기 우수검침원 표창(시장) : 4명

□ 금후계획

○ 300㎥ 이상 사용하는 급수처중 우선 관리점검대상 선정 특별관리

○ 이상 수도계량기의 조기발견으로 조정량 누락방지

- 도내 최초시행 -

상․하수도 요금「가상계좌」납부추진

	추진배경
상․하수도 등 사용료를 수용가 마다 1개의 「가상계좌」를 개설하여 시민이 직접 은행에 가지않고「가상계좌」(고지서 없이도 요금납부 가능한 시스템)에 입금․수납처리 함으로서 고지서 재발행등 비용절감과 시민편익 제공.

□ 가상계좌 납부 서비스 개요

○ 시행 은행 : 전북은행

○ 대     상 : 전체 수용가별로 1개 가상계좌 개설

○ 처리 방법

【 시행은행 】⇒ 가상계좌 번호 설정 사업소배정( 250,000계좌 )

【 사 업 소 】⇒ 수용가번호별로 가상계좌 지정

상수도 사용료 고지서에 가상계좌번호를 인쇄안내

【 수 용 가 】⇒ 다양한 입금채널을 통해 사용료 납부.

( CD기, ARS, 인터넷뱅킹, 무통장입금, 은행창구 등 )

□ 추진상황

○ 전북은행 실무자 간담회 (250,000 가상계좌 확보) : 2회

○ 가상계좌 입금자 처리 전산프로그램 개발

○ 가상계좌 납부대행 계약

※ 2006년도 상수도요금 납부방법 현황              (단위 : 천건)

계	자동이체 납부	인터넷 납부	고지서 납부
2,201	723	22	1,456
100%	33%	1%	66%

□ 금후계획

○ 가상계좌 운영 시험테스트           :   2007. 7월중

○ 가상계좌 이용홍보 안내문 배부      :   2007. 7월중

○ 가상계좌 시행                      :   2007. 8월 고지분

대형계량기실 확장 및 배관구조 개선

	추진배경
부적정하게 기설치된 대형 주계량기실을 확장 또는 구조개선 하여 계량기의 잦은 고장예방, 집단민원 발생요인 사전예방, 정확한 수도 사용량 검침 및 부과를 통한 유수율 목표(85%)달성에 기여.

□ 사업 개요

○ 사업량 : 주계량기실 확장대상    -------------    42개소

배관 구조변경 대상    --------------    94개소

○ 사업비 : 600백만원(확장:420, 구조변경:180)

○ 사업기간 :2007 ~ 2008(2년)

○ 사업내용 : 주계량기실 확장 및 배관 구조변경

※ 아파트(공동주택)80mm이상 주계량기실--266(완산:165,덕진:101)

□ 2007년 추진계획

○ 사업량 : 주계량기실 확장  ---------------------  13개소

배관 구조변경 대상   ----------------   10개소

○ 사업비 : 150백만 (확장:130, 구조변경:20)

- 우선 대상지 선정   ------------------------   1～2월중

- 설계 및 발주   ----------------------------   3～6월중

- 공사시행 및 준공   -----------------------   6～11월중

□ 추진실적

○ 계량기실 확장 : 완료1개소  ------------  서서학동 예그린@

발주12개소 -- 송천동 신동비사벌@ 외 11개소

○ 배관 구조변경 : 완료 2개소 -----  서신동 광진산업@ 외 1개소

발주 8개소  ---    평화동 주공2단지@외 7개소

○ 추진 공정율 : 58%

□ 금후계획

○ 대형계량기실 확장공사 및 배관 구조변경 개선공사

---   07. 11월내 마무리 추진

사 진 대 지

작업전: 주계량기실(부적정구조 및 장소 협소)

작업중 :주계량기실 철거(적정 배관구조 개선공사)

작업후 : 정비된 주계량기실

※ 적정배관 구조로 정비

노후계량기 교체 추진

	추진배경
맑은물 공급대책 사업으로 유효만기 고장수도계량기 연차적 교체사업추진, 계량기 불감수량 감축으로 유수율 제고.

□ 사업 개요

○  사 업 량  :  347,172개

○  추진 기간  :  ‘92 ～ 2011년

○  사  업 비  :  12,387백만원 (시비)

○  사업 내용  :  노후(유효만기) 계량기 및 고장계량기 교체

□ 그간 추진 상황

사업내용	계	2005년 까지	2006년도	2007년도	2008년 이후
계량기교체	347,172	200,172	24,000	27,000	96,000
사 업 비	12,387	5,357	701	958	5,371

□  2007년 추진계획

○ 사업량 27,000개      ---------------------       사업비 958백만원

- 대형계량기 구입추진     ------------------------    ‘07. 2～4월

- 소형계량기 구입추진     ------------------------    ‘07. 3～5월

- 하반기 노후계량기 교체 발주 추진     ----------    ‘07. 7～11월

□  추 진 실 적

○ 노후 및 고장계량기 교체   ---------------------------   9,300개

○ 추진 공정율 : 34% (‘07. 6월말 현재)

□  금 후 계 획

○ 잔여 물량(17,700개)      ---------     ‘07. 12월까지 마무리 추진

체납사용료 징수율 제고

□ 현  황

2007.6.30현재                                              (단위 : 천건/백만원)

구분 년도	조 정 액		징 수 액		체납액		징수율 (%)	비고
	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액
계	1,080	22,262	943	20,153	137	2,109	90.5
현년도	949	20,265	892	19,153	57	1,112	94.5
과년도	131	1,997	51	1,000	80	997	50.1

□ 2007년 징수목표

- 건전재정 확보 및 강력징수 실현을 위해 -

○  현년도 : 97.5%(2006목표) ⇒ 98.0%(체납제로화 수준으로)

○  과년도 : 77.5%(2006목표) ⇒ 78.5%(전년대비 1% 더 받기)

□ 문제점

○ 요금부과액 증가로 체납액 증가(음식물수수료,하수도요금 포함)

○  위탁검침으로 징수 및 독려 어려움(공무원검침시 독려징수 병행)

○ 법원경락매수에 따른 전수용가 체납액 승계불가로 징수어려움

□ 금후 추진계획

○ 고지서송달시 납부안내문(단수처분 및 재산압류등) 병행송달

○ 5건 이상 및 20만원 이상 독려부작성 전화․방문 납부독려징수

○ 체납기간 경과시 강력대응

- 5건 이상 또는 20만원 이상 체납수용가 단수처분

○ 체납자 단수계고장 발부 및 재산조회후 재산압류 단행

○ 단수처분 후 미개전 수용가 특별관리

(수시 실태조사로 도수 및 훼손 방지)

○ 고질체납자 단수를 병행한 강력체납징수로 상습체납자 근절

○ 합동징수기동반 편성 체납액 일제정리기간 운영으로 효율성제고

급 수 과  소관

ꊱ 상수도 유수율 제고사업    ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․   17-18

ꊲ「유수율 제고를 위한」블록시스템 구축사업  ․․․․․․․․  19-20

ꊳ 상수도 100% 공급사업   ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․    21

ꊴ 전주시 수도정비 기본계획 용역  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․  22

ꊵ 상수도관로 위치표지 설치사업  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․  23-24

ꊶ 절수기 보급사업 확대   ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․   25

상수도 유수율 제고사업

	추진배경
유수율이 63%로 년간 약24백만톤의 수돗물이 누수로 낭비되고 있어 혁신적인 유수율 제고사업으로 2011년까지 선진도시 수준인 85% 이상으로 유수율을 향상시켜 상수도 공기업의 경영효율화를 도모하고 전국 최고 수준의 깨끗한 수돗물을 공급하기 위함.

□ 유수율 제고 목표

2007년	증5.0%	2008년	증5.0%	2009년	증5.0%	2010년	증5.0%	2011년
65%		70%		75%		80%		85%

○ 년도별 목표

○ 유수율이 낮았던 원인

- 광역상수도 공급 이전에 수원부족으로 물공급 위주 사업시행

- 상수도관  노후도 52% (전체 2,033㎞중 노후 상수관 1,057㎞)

- 노후 계량기 등으로 인한 불감수량 증가

- 각종 공사장 도로굴착시 수도관 손상으로 인한 누수발생

○ 유수율 향상 대책

- 수돗물의 생산, 공급, 사용의 전과정에 걸쳐 무수원인을 진단하고,

블록시스템 구축사업 및 체계적인 시설관리로 유수율 향상

□ 사업계획

○ 사업기간 : 2006 ~ 2011년

○ 중점 추진 사업

- 블록시스템 구축사업 ------------------------ ‘06 ～’11

- 무수요인 저감대책 -----------------------------   년중

․ 과학적이고 체계적인 누수탐지, 노후 상수도관 통합 및 교체,

노후계량기 교체, 지속적인 불용관 정비 등

- 철저한 시설물 유지관리  -----------------------   년중

․ 정수장 유량계 교정 및 검사, 생산시설 보수 및 유지관리

- 상수도시설 현장 지도점검 강화 -----------------   년중

․ 공사현장 점검, 수도계량기 검침 점검 및 사용량 추징

소방서 급수탑 이용실태 점검 등

□ 추진상황

○ 블록시스템구축 기본계획 용역 (공정 85%)

○ 무수요인 저감대책 추진

- 불용관 정비 2㎞,누수탐사 및 긴급 누수복구 300개소,

노후배수관 세관갱생 0.9㎞, 노후계량기 교체 7,000개 등

○ 유수율 향상을 위한 주요활동 및 개선대책 추진

- 상수도시설 현장 점검 실시 : 각종 공사현장 270개소

- 누수탐지․계량기검침․생산시설(정수장) 점검

- 계량기 봉인 업무 개선 시행 (‘07.5.1부터 추진)

- 유수율 향상을 위한 학습동아리 구성 운영(‘07.3): 업무연찬 3회      - 유수율 선진도시 벤치마킹 (서울, 대구)

□ 금후계획

○ 블록시스템구축 사업

- 블록시스템 구축 기본계획용역 완료(‘07.8)

- 블록시스템 구축사업 행정절차 이행

○ 무수요인 저감대책 지속추진

○ 유수율 관련 분야별 업무 점검 및 개선대책 지속 추진

- 상수도 조례개정

- 공사현장 점검

- 분야별 업무점검 및 개선안 적극 시행

「유수율 제고를 위한」 블록시스템 구축사업

□ 사업개요

○ 사 업 비 : 1,000억원

○ 사업기간 : 2006년 ~ 2011년

○ 사업내용

- 블록시스템구축 사업

․블록고립 128개소 중 구도심 50개 소블록 정비

⇒ 노후관 개량, 노후계량기 교체, 불용관 정비, 다발관 정비 등

․전산 통합 감시시스템 구축 1식 등

□ 추진상황

○ 2007년 사업비    ⇒    17,591백만원

- 블록시스템구축 기본계획 용역비 ----------------------  813백만원

- 블록시스템구축 사업-------------------------------------- 15,978백만원

- 블록시스템구축 사업관리(C.M) -----------------------    800백만원

○ 블록시스템 기본계획 용역 (공정 85%)

- 용역기간 : 2006. 11월 ~ 2007. 8월

- 과업내용 : 블록시스템구축 기본계획 및 입찰안내서 작성

- 기본계획용역 외부 전문가 자문실시 ----------- 2007. 5

- 대형공사 입찰방법 심의(전라북도지방기술건설위원회) -- 2007. 5

⇒ 일괄입찰(Turn-Key)방식 결정

- 용역 중간보고회 및 전문가 자문 -------------- 2007. 6

□ 금후계획

○ 블록시스템 기본계획 용역 완료 ----------------- 2007. 8

○ 입찰안내서 자문 및 심의(전주시 설계자문위원회) - 2007. 8

○ 블록시스템구축사업 건설사업관리(C.M)용역 추진

- 전주시 계약심의위원회 심의 ------------------- 2007. 8

- 감리(건설사업관리) 용역 발주 ----------------- 2007. 8

- 감리(건설사업관리) 용역 추진  ----  2007. 9～ 2011.12

○ 블록시스템 구축사업 행정절차 이행 -  2007. 8~ 2008. 1

- 턴키입찰, 기본설계 실시, 기본설계 기술심의 및 평가,

- 실시설계 적격업체 선정, 실시설계 심의, 최종 낙찰자 결정

○ 공 사 착 수   -------------------------------  2008.  2

○ 공 사 완 료   -------------------------------  2011. 12

상수도 100% 공급사업

	추진배경
상수도 공급혜택을 받지 못하고 지하수나 간이상수도를 음용수로 사용하고 있는 전주시내 일부 농촌동 및 고지대 마을에 상수도를 공급하여 시민보건위생 개선.

□ 사업개요

○ 사 업 량 : 배수관 포설 L=152㎞, 가압장 신설 7개소

○ 사 업 비 : 20,000백만원

○ 사업기간 : 1999년 ～ 2008년(10개년)

○ 수혜가구 : 4,171세대, 16,475명

□  추진상황

○ 2006년까지 실적  : 배수관 포설 L=115.3㎞

- 사업비 : 13,120백만원(일반6,870, 특별6,250)

- 수혜가구 : 3,470세대, 13,880명

○ 2007년 추진상황

- 사 업 량 : 배수관 포설 L=14.5㎞, 가압장 4개소

- 사 업 비 : 1,720백만원

- 수혜가구 : 354세대 1,300명

- 추진내용

․ 실시설계 완료 (11건) ---------------------------   2007. 4

․ 공 사 중 : 10건 (동서학동 골안마을 외  9개마을)-- 공정 30%

⇒ 배수관 포설 L =13.3km 가압장 3개소

□ 금후계획

○ 중인동 도계마을 배수관포설공사(추경 확보) 발주시행

○ 동서학동 골안마을외 11개소, 11월까지 사업 마무리추진

전주시 수도정비 기본계획 용역

	추진배경
상수도시설물의 정비․확장 등에 대한 기본방향과 수도시설의 고급화 및 생산성 향상 등을 반영한 수도정비 기본계획을 추진하여 상수도의 중장기 비젼을 제시하고, 수도법에 따라 수도에 관한 종합적인 기본계획을 5년마다 정비.

□ 사업개요

○ 사 업 량 : 전주시 수도정비기본계획 1식(전주시 전지역)

○ 사 업 비 : 2,190백만원

○ 사업기간 : 2007. 7. ～ 2008. 6.(12개월)

□ 용역 주요내용

○ 기본계획의 규모결정, 상수도 시설확충 및 개량계획

○ 유수율제고사업과 연계한 계획 수립

○ 물수요관리 시행계획 및 상수도 유지관리계획

○ 시행중인 팔복배수지 신규개발예정지 추가반영

- 혁신도시, 만성동 복합단지, 장동유통단지 등

○ 미활용 배수지 활용방안(완산, 송천, 화산, 서신, 금암배수지)

○ 지곡수계 배수지시설개량 방안 (정수장 ⇒ 배수지 전환)

□ 추진상황

○ 사업수행능력평가 및 입찰   ------------------   2007. 6

○ 용역계약 및 착수   ------------------  2007. 6.~2007. 7

□ 금후계획

○ 용역 시행   -----------------------  2007. 7.~2008. 6

상수도관로 위치표지 설치사업

	추진배경
각종 건설공사로 인한 상수도관의 파손 등 사고위험의 근원적인 해소를 위하여 상수도 관로에 표지주를 설치, 사고로 인한 급수중단이나 녹물 발생 등의 시민불편을 해소하고, 수도시설의 유지관리 편의 도모.

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 전지역

○ 사업대상 : 상수도 관로 677㎞(도․송수관로 57, 배수관 620)

○ 사 업 비 : 200백만원(‘07. 50백만원)

○ 사업기간 : 2006년 ~ 2008년

□ 추진상황

○ 2006년까지 실적 : 15개 노선 L=30㎞ 완료

○ 2007년 추진상황 : 천변 고수부지 L=16.0㎞(전주천 8, 삼천 8)

- 공사개요 : 표지주 300개소, 표지판 40개소

- 공사기간 : 2007. 5 ~ 2007. 9

- 관로조사 및 설계   ---------------------------   2007. 4

- 하천부서 점용협의   --------------------------   2007. 5

- 공사착공     ----------------------------    2007. 5. 25

※ 신규관로는 배수관포설 공사시 병행 추진 : L= 13.3㎞

□ 금후계획

○ 2007년도분 9월까지 공사완료 추진.

□ 상수도 관로 위치표지(안)

○ 도로변 표지못 설치

직 선 라 인	연 결 부 분
(기존관로 표시)	(신규관로 표시)

○ 하천내 표주설치

전 면	후 면

절수기 보급사업 확대

	추진배경
공공시설물, 공동주택, 단독주택의 급수장치에 절수기를 설치하여 물 절약을 생활화하고 물의 소중함을 인식시켜 물 부족 사태에 적극적으로 대처.

□ 사업개요

○ 총사업량 : 595,000개

○ 사업대상 : 단독주택, 공동주택, 상가 등(2001.9.27이전 건축물)

○ 사업기간 : 2001 ～ 2009년(10년)

※ 법적근거 : 수도법 제11조의 2(절수설비 등의 설치)

- 2001. 9. 28. 이후 신축 건축물은 의무적으로 절수설비 설치

□ 추진상황

○ 2006년까지 실적 : 절수기 설치 449,471개(75%)

○ 2007년 추진상황

- 설치계획 : 절수기  40,000개 정도

- 사 업 비 : 52,286천원(인건비19,586  재료비32,700)

- 추진실적

․ 절수기 설치대상 조사 및 파악  ------------ 2007 . 4

․ 절수기 설치 : 14,500개 설치 완료

□ 금후계획

○ 절수기 보급설치 잔여물량 : 2007. 11월중 마무리 추진

수질관리과  소관

『전국 최초』변방동지역 지하수 수질검사 무료실시

ꊱ 건강증진을 위한 시민 위주의 행정실현   ․․․․․․․․․․․․․  27

『수돗물 품질인증제』추진 등

ꊲ 시민이 신뢰하는 깨끗한 수돗물공급   ․․․․․․․․․․․․․․ 28

- 과학적인 정수처리 및 수질향상을 위한 업무연찬 등

ꊳ 국가공인 수질검사기관의 효율적 운영  ․․․․․․․․․․․․․․ 29

ꊴ 맑고 깨끗한 사업장 시설물 유지관리  ․․․․․․․․․․․․․․․ 30

『『전국 최초』변방동지역 지하수 수질검사 무료실시

건강증진을 위한 시민 위주의 행정실현

	추진배경
변방 자연마을의 지하수 음용세대 중 수질검사를 실시하지 않고 음용하는 지하수에 대하여 무료로 수질검사를 실시하여 주민의 건강증진 및 편익을 제공하고 수질로 인한 불안감을 해소하여 시민에게 다가가는 행정서비스를 제공하고자 함.

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2007년～2009년(3년간)

○ 대    상 : 전주시 변방동(11개동) 97개 마을(3,449세대)

○ 수질검사 개요

- 검사항목 : 일반세균외 16개 항목(음용 적합ㆍ부적합 검사)

- 수 수 료 : 면제 (면제금액 : 76,000원/건)

□ 추진상황

○ 지하수 수질검사 대상 파악 및 해당 동과 업무협의 - ‘07.2월

- 대상지역(11개동) : 동서학동, 평화2동, 팔복동, 우아2동, 호성동,

송천1.2동, 동산동, 조촌동, 삼천3동, 인후2동

○ 대시민 홍보실시 - 언론매체(TV방송사 등 7개소) 보도 (‘07.2.9)

○ 수질검사 실시  - 동서학동 활터마을외 39개마을 527세대

※ 부적합 지하수 세대는 원인 및 상수도 음용 등 대책 제시

□ 금후계획

○ 매월 1개동씩 선정하여 하반기 수질검사 추진

- 조촌동 등 6개동 39개 마을 462개소 실시

○ 수질 부적합 세대에 대하여 안전한 물을 음용하도록 계도

- 상수도 음용 권장 및 부득이한 경우 정수기사용 등

『수돗물 품질인증제』추진 등

시민이 신뢰하는 깨끗한 수돗물 공급

	추진배경
『도내최초』수돗물품질인증제 실시 및 선진국 수준의 과학적인 수질관리․검사로 시민이 신뢰하는 양질의 수돗물 공급.

□ 사업개요

○ 상수원수부터 수도꼭지수까지 과학적인 수질관리 및 검사

- 원      수 : 상수원 정기순찰 강화 및 수질오염여부 파악

- 정      수 : 선진국수준의(90개 항목) 수질검사 체제 유지

○ 시민이 참여하는 수질관리로 수돗물 신뢰성 제고

- 정수장 시민공개 운영 및 민․관 합동 수질검사 등 실시

□ 추진상황

○『도내최초』수돗물 품질인증제 추진 : 400개소

- 세대방문 후 수질적합여부를 진단, 품질인증마크 부착

- 기대효과 : 수돗물 신뢰성 제고 추진에 기여

※ 방송 및 신문 등 언론매체 활용 시정보도(‘07.4.19)

○ 수돗물 신뢰도 향상을 위한『수돗물 품질보고서』발간

- 원․정수 등에 대하여 관련규정보다 강화한 수질검사 추진

- 선진 수도행정 정책사항 및 물과 관련된 상식 등을 게재

○ 상수원보호구역 정화활동 전개 : 9회

○ 수질평가위원회 및 민․관합동 수질검사 : 각 1회

○ 상수도 정책 투명성 제고 - 정수장 시민 방문 (1,380명)

□ 금후계획

○ 수돗물 품질인증제 지속적 추진 - 600여 개소 추가 실시

○ 하반기 민․관 합동 수질조사 등 수돗물 이상유무 모니터링

○ 수돗물의 품질고급화를 위한 공동 연구과제 추진

- 과학적인 정수처리 및 수질향상을 위한 업무연찬 등

국가공인 수질검사기관의 효율적 운영

	추진배경
국가공인 수질검사기관의 효율적인 운영을 위하여 검사기관의 신뢰성 제고 및 지속적인 홍보, 신속한 민원서비스 제공.

□ 사업개요

○ 국립환경과학원『먹는물 수질검사기관 제33호』지정 ― ‘00.7.25

○ 검사범위 : 먹는물(수돗물 등), 상수원수, 먹는샘물, 각종 지하수

○ 수 수 료 :  5,300원/건 ～ 283,900원/건

□ 추진사항

○ 환경부 주관 먹는물 수질검사기관 혁신회의 과제 추진

- 수질검사 인력 보완 및 수질검사 자료 보관 등

○ 공인 수질검사기관 정도관리(AQC) 시행(‘07.5.28～6.27)

○ 시․군 수질관리부서 직접 방문하여 기관홍보 : 3회

○ 수수료 수입증대를 위한 시․군 방문 직접수거(378건)

※ 세입누계 : 90,698천원

○ 변방지역(자연부락) 지하수 무료수질검사 : 527개소

□ 금후계획

○ 검사기관 대외 공신력 추구를 위한 분석자 전문교육 이수

- 국립환경과학원 및 한국수자원공사 수질분석과정 (3명)

○ 시․군 수질관리부서에 지속적인 기관홍보 추진 (4회)

○ 공인 수질검사기관 협의체를 이용한 상호 정보교류 확대

- 선진기관 벤치마킹 등 분석 및 연구발전 사항 접목

맑고 깨끗한 사업장 시설물 유지관리

	추진배경
사업장 노후 시설물의 개․보수로 깨끗하고 안정적인 수돗물 생산으로 시민 공개에 따른 공원 같은 상수도사업장 환경조성.

□ 사업개요

○ 현    황

- 사업장 17개소 (취수장 5, 정수장 4, 배수지 8), 도․송수관 70㎞

○ 사업장 시설물 유지관리   ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ 42건, 소요예산 837백만원

- 구축물 개량 및 보수 : 대성정수장 급속여과지 트라프 교체 등 6건

- 기계․전기시설 : 대성 급속여과지 배관설비 노후 교체수선 등 2건

- 소규모 수선 : 취․정수장 구축물 유지보수 등 34건

○ 깨끗하고 공원 같은 사업장 가꾸기(수목전지 및 제초작업)

- 취․정수장 및 배수지 환경정비  ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ 소요예산  17백만원

□ 추진상황

○ 사업장 시설 개․보수 및 수선 24건 ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ 245백만원

- 구 축 물 : 대성 급속여과지 트라프 교체 등 2건 ꠏꠏꠏꠏꠏ 140백만원

- 기계장치 : 대성 급속여과지 배관설비 노후 교체수선 ꠏꠏ 54백만원

- 시설장비유지비 : 효자배수지 맨홀 보수 등 21건 ꠏꠏꠏꠏꠏ 51백만원

○ 사업장 환경정비(풀베기 등) 작업 실시          ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ 9회 실시

□ 금후계획

○ 사업장 시설물 유지관리 ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ 592백만원

- 공업용수 노후 도수관 ∅700㎜ PE 갱생공사 및 소규모 수선

○ 사업장 시설 및 도․송수관 시설점검 강화

○ 사업장 환경정비 작업 지속 실시

- 시민이 즐겨 찾는 공원 같은 사업장 조성