제248회 전주시의회 제2차 정례회

2007년도 행정사무감사특별위원회

2007년도

주요업무 추진상황 보고

교    통    국

보   고   순   서

□	일 반 현 황		-------	1
□	부 서 별 주 요 기 능		-------	2
□	기 본 현 황		-------	3
□	주요업무 추진상황
	○	교통행정과	-------	7
	○	교통시설과	-------	15
	○	도로과	-------	24
	○	재난안전관리과	-------	51
	○	하수관리과	-------	59
	○	차량등록사업소	-------	71

일  반  현  황

□ 기   구 : 5과 1사업소 22담당

																					교 통 국
	교통행정과 (4 담 당)							교통시설과 (3 담 당)								도 로 과 (4 담 당)											재난안전 관 리 과 (4 담 당)							하수관리과 (3 담 당)							차량등록 사 업 소 (4 담 당)
	교통행정							교통시설								도로행정											민 방 위							하수행정							등 록 1
	대중교통							경 전 철								도로시설											재난관리							하수시설							등 록 2
	운 수							교통정보								도로정비
																											복구지원
																																		하수정비							보험지도
	교통지도															도로경관											하천관리														건설기계

□ 정‧현원 현황(정원 100명, 현원 98명)

과 별		총 계	일 반 직						계약	기능
			4급	5급	6급	7급	8급	9급
계	정 원	100	1	6	22	27	22	4	1	17
	현 원	98	1	6	21	43	5	4	1	17
교통행정과	정 원	18	1	1	4	6	4	1		1
	현 원	18	1	1	4	8	2	0		2
교통시설과	정 원	16		1	3	4	2		1	5
	현 원	15		1	2	5	1		1	5
도 로 과	정 원	15		1	4	4	5	0		1
	현 원	15		1	4	8	0	1		1
재난안전관리과	정 원	14		1	4	5	3	0		1
	현 원	14		1	4	5	1	2		1
하수관리과	정 원	12		1	3	5	2	1
	현 원	12		1	3	7	1	0
차량등록사업소	정 원	25		1	4	3	6	2		9
	현 원	24		1	4	10	0	1		8

□ 부서별 주요기능

과 별	분 장 사 무
교통행정과	○ 교통종합계획 수립 ○ 대중교통(버스, 택시, 화물) 업무 추진 ○ 자동차운송사업체(버스, 택시, 화물 등) 지도 감독 ○ 공영주차장 확충 및 관리, 교통영향평가업무
교통시설과	○ 도로교통 안전시설물 설치 및 유지관리 ○ 전라선 복선화 사업 ○ 시내버스 정보화사업(BIS) 추진 및 운영관리 ○ 지능형 교통체계(ITS) 추진 및 운영관리
도 로 과	○ 도로부지관리, 도로안내표지판 설치관리 ○ 도로포장 보수지도, 자전거도로 시설, 가로등관리 ○ 신규도로개설 및 용지보상, 도시가로망 확충사업 ○ 가로환경 및 노점상 지도단속, 자전거이용 활성화
재난안전관리과	○ 민방위 계획수립 및 추진 ○ 재난방재 종합계획수립 및 시행, 재난재해대책추진 ○ 자연하천조성사업, 하천관리(국,공유재산 관리)
하수관리과	○ 하수도 공기업특별회계 운영 ○ 하수도 정비기본계획 수립 및 시행 ○ 하수관거 정비사업 추진 ○ 하수종말처리시설 운영관리
차량등록사업소	○ 자동차 등록(전산입력, 자료관리 및 증명발급 등) ○ 자동차 및 건설기계 과태료 부과 ○ 건설기계등록(전산입력, 증명발급,검사최고, 정비명령 등) ○ 무보험차량조사(손해배상보장법위반 과태료, 범칙금부과 등)

□ 기본현황

○ 운수업체(2007. 10. 31일 현재)

(단위 : 개소/대)

구 분	계	버 스			택 시		화 물		렌트카	특수 여객
		시내	시외	관광	회 사	개 인	회 사	개 인
업 체 수	171	5	5	22	25	-	69	-	31	14
보유대수	9,800	398	477	412	1,599	2,283	1,863	1,713	1,020	35

○ 교통안전 시설물

(단위: 개소, 개)

교차로	신호등(개소)			제어기	보행자 음 향 신호기	보행자 잔 여 표시기	교 통 표지판	차 선	횡단 보도	횡단보도 조 명 등
	소계	LED	전구
457	458	282	176	396	74	350	8,681	850개노선 L=407㎞ 차선L=2,085km	1,902	103개소368등

○ 도    로

(단위 : 개소, ㎞)

구 분	계		고속국도		일반국도		지 방 도		시 도
	노선	연 장	노선	연 장	노선	연 장	노선	연 장	노선	연 장
총연장	850	407	1	5	5	62	3	22	841	318
포장도	850	407	1	5	5	62	3	22	841	318
포장율 (%)		100		100		100		100		100

※ 도로율 : 16.28%(도로면적/시가지면적)

○ 교량 및 기타 시설물

(단위 : 개)

구분 계	교 량					육교 보도	지하 보도	지하차도	터널	비 고
	소계	고속 국도	시의 국도	지방도	시도
126	107		34	3	70	8	6	5	2

※ 장대교량(삼례교 : 570m,  회포대교 : 707m)

○ 옥외광고물 현황

(단위 : 개)

광고업자 등록현황	시 지 정 광 고 시 설				비 고
	계	게시대	벽보판	기 타
430	515	150	365	-

○ 하    천

(단위 : ㎞)

구 분		개소	하천연장	제 방 연 장			개수율 (%)	비고
				계	기개수	미개수
계		24	100.5	177.7	141.3	36.4	79.5
법정하천	소 계	21	94.5	164.9	134.9	30.0	81.8
	국가하천	3	14.4	28.8	28.8	-	100.0
	지방 1급	2	19.8	39.6	38.6	1.0	97.5
	지방 2급	16	60.3	96.5	67.5	29.0	70.0
소 하 천		3	6.0	12.8	6.4	6.4	50.0

○ 하 수 도

구 분		처리구역 (㎢)	계획연장 (㎞)	시설연장 (㎞)	미시설연장 (㎞)	보급율 (%)	비고
계		54.97	1,884	1,200	684	63.7
합 류 식		7.43	658	658	0	100.0
분류식	소 계	47.54	1,226	542	684	44.2
	오수관거	-	718	263	455	36.6
	우수관거	-	508	279	229	54.9

○ 하수․위생처리 시설

구 분	하 수 처 리	위 생 처 리
위 치	덕진구 송천동 2가 1130번지
시설용량	1일 처리능력 ⇨ 403,000㎥ - 1단계 시설 : 103,000㎥ - 2단계 시설 : 200,000㎥ - 3단계 시설 : 100,000㎥	1일 처리능력 ⇨ 290㎘ - 분 뇨 : 30㎘ - 정 화 조 : 260㎘
처리방법	1․2단계 고도처리(CNR)공법 3단계 고도처리(CSBR) 공법	하수 연계처리 (1994년부터 시행)

○ 차집관로

하 천 명	연 장 (㎞)	맨 홀 (개)	우수토실 (개소)	환기구 (개소)	여수토실 (개소)
계 (6개노선)	88.9	1,010	251	73	5
전주천 (좌, 우안)	23.5	369	142	37	4
삼 천 (좌, 우안)	15.4	155	45	18
금암천 (좌, 우안)	4.4	82	38	9
아 중 선	12.0	174	16	4
팔복선(공장,생활)	16.9	183	8	5	1
상 관 라 인	10.4	47	2
기 타	6.3

○ 자동차등록(2007. 10. 31일 현재)

(단위 : 대)

합 계	승 용 차	승 합 차	화 물 차	특 수 차
214,697	163,297	12,468	38,559	373

교통행정과 소관

ꊱ	화산로 - 백제로 버스노선 확충 ---------	8
ꊲ	고객중심의 대중교통 체계 확립 ---------	9
ꊳ	불법 주․정차 단속 효율성 제고 ---------	10
ꊴ	한 쪽 면 주차하기 운동 추진 -----------	11
ꊵ	만남의 광장 조성 사업 -----------------	12
ꊶ	녹색 주차장 확장 사업 -----------------	13
ꊷ	시외버스 터미널 정비사업 --------------	14

화산로-백제로 버스노선 확충

백제로와 화산로에 버스노선을 확충하여 팔달로와 연계된 내부

순환버스 체계를 확립하여 주민 생활편의 도모

□ 사업개요

○ 대상노선 : 화산로 ~ 백제로 연계 노선

○ 사업기간 : 2006. 12 ~ 2007. 12

○ 사업내용 : 도시 팽창과 시민 욕구에 맞춰 시내버스 노선체계 구축

□ 추진상황

○ 시행시기 : 2007. 4. 1.

○ 대상노선 : 순환노선 2개 노선(5,6번)

- 이용객수(2007. 9월말까지) : 390,600명

○ 구    간 : 화산체육관~화산로~백제로~팔달로~장승로~화산체육관

○ 추진효과

- 화산로 ↔ 백제로와 팔달로 장승로 연결 노선

- 서신지구 대규모 신규아파트 수요 충족

- 고속․시외버스터미널 연결노선으로 각 권역별 이용 편의제공

- 시내 전지역 환승체계 구축으로 권역별 순환노선 연계 및 무료환승 용이

□ 문제점 및 대책

○ 노선신설로 이용객 감소에 따른 손실보전금 예산 부족

➩ 순환노선 손실보전금 200백만원 결산추경 확보 지급

□ 금후계획

○ 순환노선 추가 대상지역 발굴 및 기존 순환노선 보완대책 마련

- 이용객이 많은 노선부터 추가 배치 검토

- 기존노선에 대한 이용객의 변화에 따른 노선 변경 강구

고객중심의 대중교통 체계 확립

○ 자가용 자동차의 증가로 교통정체가 지속되어 정시성 결여

등으로 수송효율 저하 및 원가상승에 따른 경영적자 누적

○ 대중교통 이용 우대정책 부족, 승용차 이용 증가 및 교통 혼잡

□ 사업개요

○ 고객 중심의 합리적 노선 조정 및 무료 환승제 지속 운영

○ 이용객 중심의 순환노선 신설 : 2개 노선 16대

○ 버스업체 재정지원(유가보조금, 적자노선지원 등) : 6,087백만원

□ 추진상황

○ 고객 중심의 노선조정으로 이용객 편의 도모 : 2007. 4. 1

- 증회운행 : 24노선 62대 580회, - 노선폐지 : 26노선 78대  948회

- 감회운행 :  6노선  8대  98회,  - 기점변경 : 54노선 101대 1,211회

- 노선연장 :  4노선 13대 154회, - 노선분리 :  1노선  1대  14회

- 경유지변경 : 20노선 52대 599회

○ 무료환승객 이용실적(2007. 9월말 현재) : 2,550,599명

※ 2006. 3. 15 ~ 12. 31까지 이용실적 : 2,104,657명

○ 전년 대비 교통카드 이용율 증가 : 2.1%(50.6%➩52.7%)

○ 전주시 대중교통계획 연구용역 시행 : 2006. 12. 1 ~ 2007. 8. 20

○ 운수업체 재정지원(유가보조금, 적자노선지원 등) : 4,516백만원

□ 금후계획

○ 연차적으로 교통카드 이용율 향상(2010년목표 : 70%)

○ 버스업체 경영진단 연구용역 실시 --------- 2008년 초

- 경영분석 및 노선별 표준원가 산정, 적자노선 실차 조사

○ 운수업체 적기 지원으로 경영개선 및 친절서비스 향상

- 적자노선 손실보전, 벽지노선 손실보전, 유가보조금, 대․폐차 지원 등

불법 주․정차 단속의 효율성 제고

○ 터미널‧시내버스 승강장 주변 및 주요 간선도로의 불법 주․정차로 인하여 시내버스 운행 및 교통체증 발생

○ 취약지역 시간대의 효율적인 불법 주․정차 단속을 실시하여 교통체증 해소

□ 운영현황

○ 단속구간 ------------------------ 273개 구간 229.7km

- 금지구역 : 201개 구간 161km,  - 견인지역 : 72개 구간  68.7km

○ 단속인력 및 차량 : 50명(차량 16대)

○ 단속반 운영 : 20개반 50명

- 주간 10개반 30명, 야간 4개반 8명, 휴무 6개반 12명

○ 무인단속시스템 운영 ---------- 29개소(완산 18, 덕진 11)

□ 추진상황

○ 무인단속시스템 확대 설치 ---------------------- 19개소

- 주요간선도로, 대형유통시설․예식장, 민원다발지역

○ PDA를 활용한 단속시스템 운영 ----------------- 28대

○ 교통 서포터즈 운영 ----------------------- 24개 구간 100명

- 주요간선도로, 대형유통시설․예식장, 민원다발지역

○ 교통사고 줄이기 캠페인 추진 --------------- 6회 3,357명

○ 차량탑재형 불법주정차 이동식 단속시스템 도입 ------ 2대

□ 금후계획

○ 무인단속 시스템 24대 추가 설치 -------------- 678백만원

○ 차량 탑재형 불법 주․정차 이동식 단속시스템 추가 도입 -------- 2대

○ 지역실정에 맞는 불법 주․정차 단속의 탄력적 운영 ------------ 연중

○ 터미널, 시내버스 승강장 주변 불법 주․정차 근절 ------------- 연중

한 쪽 면 주차하기 운동 추진

○ 차량 급증에 따른 주차시설 부족으로 주택가 이면도로의 양방향        불법 주정차로 인한 주민통행 불편과 교통사고 위험이 존재하고

○ 소방차, 구급차 등 긴급차량의 통행에 막대한 지장을 주고 있어

주민참여에 의한 한쪽면 주차하기 운동을 전개하고자 함

□ 사업개요

○ 운영지역 : 시범지역 4개소(구청별 2개소)

○ 운영방법 : 자율지역과 강제지역으로 구분 운영

- 자율지역 : 양쪽 갓선, 황색 실선

- 강제지역 : 한쪽차선은 백색실선, 반대쪽 차선은 황색실선

○ 사 업 비 : 50백만원

□ 추진상황

○ 양 구청 대상지역 신청(각2개소) ----------------- 4개소

○ 대상지역 관할 주민 사업설명회 및 여론수렴 ------ 4개동

○ 대상지역 선정 및 구간 설정 --------------- 4개구간/1,681M

- 자율운영 : 2개 구간(1,272M)

• 완산구(효자2동 서원로 2길, 서신동 서신남1길)

- 강제운영 : 2개 구간(409M)

• 덕진구(인후1동 진버들1길, 금암2동 세원길)

○ 대상지역 현장 실사 ---------------------------- 2007.11

○ 자율지역 및 강제지역 구분 차선표시 관련, 경찰서 협의 -- 2007.11

□ 금후계획

○ 차선정비 설계 및 발주 의뢰 ----------------- 2007.12

○ 차선정비 ----------------------------------- 2007.11～12

○ 주민홍보 및 운영 --------------------------- 2008. 1

만남의 광장 조성 사업

○ 전주를 찾는 방문객에게 만남의 장소 및 휴식 공간 제공

○ 전주에서 타 지역으로 출퇴근하는 직장인에게 주차 공간 제공 및

만남의 장소 마련

□ 사업개요

○ 위    치 : 5개소(동․서․남․북 방향)

- 남원․임실, 봉동․고산, 군산․익산, 정읍․고창, 무․진․장 방향

○ 사업기간 : 2006～2008년(3년)

○ 총사업비 : 3,070백만원

○ 사업내용 : 주차장, 휴게시설, 쉼터, 조경 등

□ 추진상황

○ 남원․임실, 봉동․고산방면 만남의 광장 조성 완료 : 2006년

○ 무․진․장 방면 : 도시계획시설결정 및 실시설계 용역(‘07. 9 ~‘08. 1)

- 위  치 : 덕진구 산정동 산정충전소 옆, 2,640㎡(80면)

○ 정읍․고창 방면 : 국립전주박물관 부근 적정 부지 물색 중

□ 문제점 및 대책

○ 도심 인근에 접근성 등을 충족한 적정부지 선정 지난

○ 시세와 감정가 차이 과다로 토지 협의매수가 어려운 현실임

⇒ 조성 부지 선정 후 지속적인 설득으로 협의매수 추진

□ 금후계획

○ 무․진․장 방면

- 도시계획시설결정․인가 등 절차이행 ------ 2007. 9 ~ ‘08.

- 공유재산관리계획 의회 심의 ------------ 2007. 11 ~ 12

- 토지협의매수 추진 --------------------- 2007. 12

- 만남의 광장 조성공사 ------------------ 2008. 3 ~10

○ 정읍․고창 방면

- 만남의 광장 조성부지 선정 완료 -------- 2007년 한

- 행정절차이행, 토지 보상, 공사 추진 ---- 2008. 1 ~12

녹색주차마을 확장 사업

○ 도심 열섬 현상 해소 및 푸른 녹색 도시 건설

○ 주택가의 심각한 주차난 해소를 위하여 주택의 담장을 허물어

여유 공간을 주차시설과 녹지공간으로 조성

□ 사업개요

○ 조성지역 : 덕진구 인후2동 29통 일부(한전 뒤)

○ 규    모 : 주택21동

- 시범가로 633m 조성, CCTV 5개소 설치, 폐기물처리 1,600톤

○ 사 업 비 : 471백만원

- 토  목 : 251,259천원    - 전기(CCTV) : 118,500천원

- 폐기물 :  30,240천원    - 관급자재 : 65,312천원

□ 추진상황

○ 공 사 착 수 ------------------------------ 2007. 5. 10

⇒ 공    정 : 70%(2007.10.31)

- 대상주택 담장철거(11동)

- 방범창 및 방범시설 설치(11동)

□ 문제점 및 대책

○ 하절기 계속된 우기(장마)로 인하여 인후2동 지역내 하수관거

정비사업(BTL) 미 준공

- 사업구간내 700m중 580m 완료 (11월 중순 완공 전망)

- 하수관거 정비사업 미준공 으로 녹색주차마을 조성사업 공사

일시중지(‘07.11. 1)

⇒ 하수관거 정비공사 완료 후 연내 공사가 완료될 수 있도록 추진

□ 금후계획

○ 공 사 완 료 ------------------------------------- 2007. 12

시외버스 터미널 정비사업

○ 1970년대 건축된 노후 시설물로서 이용객들에게 많은 불편을 초래하고 있어 현대화 시설로 정비 이용객들에게 편익 제공

○ 전주의 관문으로서 전주를 찾는 외지인들에게 오래도록 기억에 남는 깨끗한 도시로서의 이미지 제고

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 시외버스터미널 정비사업

○ 사 업 량 : 대합실 시설개조 외 5개 분야

- 원형 승강장, 대합실 증축, 기존 대합실 내부 리모델링

- 화장실 신축 및 리모델링, 고객 전용주차장 신설, 조경시설

- POS(매표기기 7대) 설치 - 예약, 예매 및 신용카드 기능 등

○ 사 업 비 : 1,000백만원(특별교부세 600, 도비 200, 자부담 200)

○ 사업기간 : 2007. 7. 23 ~ 9. 20

□ 추진상황

○ 정비사업 계획수립 ------------------------2007. 2. 7

○ 기본설계 및 실시설계 -------------------- 2007. 3 ~ 6

○ 건축설계 허가신청 협의(덕진구 건축과) --- 2007. 6. 19

- 임대차 토지소유자 사용승낙서 징구 완료(21명) -- 2007. 6. 28

○ 정비사업 건축허가 신청(덕진구청) -------- 2007. 6. 29

- 시, 전북고속, 건축사 착공 등 업무협의 --- 2007. 6. 29

(지방자치단체를 당사자로 하는 계약법 준용 - 일반경쟁입찰 등)

○ 입찰공고(전북고속) ---------------------- 2007. 7. 2

○ 공 사 착 공 ----------------------------- 2007. 7. 23

○ 공 사 준 공 ----------------------------- 2007. 9. 20

※ 고속버스터미널 정비사업 추진 - 2007. 9. 17 ~ 11. 30

○ 사업내용 : 도색공사, 고객 대기실 신설 및 냉난방 설치공사, 각 층별 화장실 보수, 터미널 간판 설치 등

○ 사 업 비 : 1,000백만원(전액 자부담)

교통시설과 소관

ꊱ	어린이 보호구역 개선사업 --------------	16
ꊲ	교통사고 잦은지점 개선사업 ----------	17
ꊳ	LED 신호등 교체 설치 사업 -----------	18
ꊴ	차선 도색(재도색) 사업 ----------------	19
ꊵ	교통안전시설 확충 및 정비사업 ---------	20
ꊶ	신호등 설치․이설 집약화 사업 ---------	21
ꊷ	교통사고 줄이기 본부 설치운영 ---------	22
ꊸ	교통 정보․신호 시스템 효율적 운영관리 -	23

어린이 보호구역 개선사업

교통약자인 어린이를 안전사고로부터 보호하기 위한 통학로

교통안전시설 확충 및 정비

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2003 ~ 2007(1단계 사업)

○ 총사업량 : 중앙초교 외 58개교

○ 총사업비 : 9,645백만원(국비 50%, 시비 50%)

○ 2007년 사업량 : 16개교  3,092백만원

- 2006 이월예산 : 2,086백만원(국 579, 시 1,507)

- 2007년 본예산 :   756백만원(국 378, 시   378)

- 2007 추경예산 :   250백만원(도  50, 시   200)

○ 2006년까지 추진실적 : 43개교(6,553백만원)

구 분	계	2003	2004	2005	2006
사 업 량 (개소)	43	6	9	15	13
사 업 비 (백만원)	6,553	1,461	1,020	2,200	1,872

□ 추진상황 - 공정 85%

○ 사고이월 공사분 2개학교(남초교,신동초교) 준공 -- 2007. 5

○ 2007년 1차분 9개교 공사 준공    ----------- 2007. 8

○ 2007년 2차분 5개교 공사 추진 중 -------- 2007.7~12

□ 문제점 및 대책

○ 학교 주변상가 반대로 공사지연 및 공사중 잦은 설계변경 발생

➩ 어린이의 안전한 통행권 확보차원의 사업임을 이해․설득

○ 주변 여건변화로 초등학교 주변 스쿨죤 요구 민원 많음.

□ 금후계획

○ 2007년 2차분 공사 완료    ------------------- 2007. 12

교통사고 잦은지점 개선사업

년간 중대형 교통사고 5건 이상 발생장소 사고원인을 분석

사고 재발생 방지를 위한 개선 사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 사고잦은지점 4개소

- 색장동 커브길, 완산동 용머리길, 산천농수산시장3거리, 송천역앞

○ 사업내용 : 차량감속 유도시설 및 안전시설 보강, 가로축 개선

○ 사 업 비 : 110백만원(국비 50%, 시비 50%)

□ 추진상황 - 공정 100%

○ 개선을 위한 전문가 노상간담회 및 관련기관 자문 --- 3회

○ 사고 재발방지를 위한 안전시설 설치 완료 ----- 2007.10

(경광등, 갈매기 표지판, 델리네이터, 차선조정,  등)

□ 문제점 및 대책

○ 매년 경찰청 및 도로교통 안전관리공단에서 사고잦은지점을 지정하여 안전시설 확충을 요구하고 있으나 예산부족으로 완벽한 시설 보강 미흡

➩ 예산의 범위 내에서 안전시설을 설치하고, 교통문화 의식 개선을 위한 홍보, 교육, 캠페인 등 교통사고 줄이기 운동 전개

LED 신호등 교체 설치 사업

○ 전력소비 및 고장이 많은 전구식 신호등을 LED 신호등으로 교체

- 고장발생 70% 감소로 유지보수비 절감 및 전력료 85% 감소

- 태양빛에 의한 난반사 현상 해소 및 양호한 시인 - 사고25%감소

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2002 ~

○ 교체대상 : 352개소 4,165등

○ 사 업 비 : 8,000백만원(국비 6,198, 시비 1,802)

○ 2006년까지 추진상황

- 사 업 량 : 168개소 완료(48%)

- 사 업 비 : 1,463백만원

○ 2007년 계획

- 사 업 량 : 58개 교차로

- 사 업 비 : 343백만원(국비 240, 시비 103)

□ 추진상황 - 공정 100%

○ LED 교통신호등 교체설치 단가계약 착공  --- 2007. 8

○ 교체설치 사업완료(58개 교차로 신호등) ------ 2007. 10

□ 문제점 및 대책

○ 에너지 절감을 위해 산업자원부의 LED신호등 연차적 교체계획에 따라 국비지원 사업으로 추진함으로 사업기간 장기간 소요

➩ 년간 200백만원 정도의 전력료 및 유지보수비 예산 절감효과가 있지만 우리시 재정을 고려할 때 국비지원 시기에 맞춰 교체 시행

차선 도색(재도색) 사업

차선 재도색 시기 기준에 의한 사후 유지관리 철저로 교통

사고 방지 및 도로 경관 향상

□ 사업개요

○ 차선현황 : 850개 노선, 차선길이 2,085km, 횡단보도 1,902개

○ 사업내용 : 18개 노선, 차선길이 400km, 횡단보도 500개

○ 사 업 비 : 1,425백만원(도색 1,300, 지우기 125)

□ 추진상황 - 공정 80%

○ 2007년 1차분 차선도색 공사 완료

- 전주마라톤코스 외 주요간선도로 및 중로 차선퇴색구간 도색 : 280km 1,000백만원

○ 2007년 2차분 차선도색 공사 추진 중

- 평화로, 대학로 외 주요도로 및 이면도로 차선퇴색구간 재도색 : 120km 425백만원

□ 문제점 및 대책

○ 차선 평균수명은 주요간선도로 및 교차로는 1년, 기타 도로는 2년 이하인데 예산부족으로 주요도로 3년, 이면도로 6년 주기로 재도색

※ 국도유지관리사무소의 경우 1년 1회 재도색

➩ 연차적으로 사업비를 증액 확보, 누적된 재도색 주기 단축

➩ 신규 및 재포장 도로는 차선 수명이 긴 2액형으로 도색하는 지침 수립시행

□ 금후계획

○ 공사 추진 완료  ------------------------------ 2007. 12

※ 민원요구 장소 외 조사된 장소 중 우선순위에 의한 도색 추진

교통안전시설 확충 및 정비사업

주의․지시․규제․보조 등 교통표지판 및 반사경․규제봉

갈매기․표지병․안전휀스 등 시선유도 교통안전시설 확충 및

정비로 교통사고 예방

□ 사업개요

○ 시설현황 : 표지판 8,681개, 시선유도시설 88,233개

반사경 1,480개, 안전휀스 등 안전시설 6,200m

○ 사업내용 : 교통표지판, 반사경 설치 및 보수 200개

무단횡단방지 및 시선유도 규제봉 설치,보수 2,000개

안전휀스 설치

○ 사 업 비 : 400백만원(추경200포함)

□ 추진상황 - 공정 80%

○ 민원요구 및 경찰서 요구사항 우선 시행하고

주요간선도로 및 전주마라톤코스 일제 정비완료

- 교통표지판 230개소,      - 반사경 80개,

- 중앙분리 안전휀스 80m,  - 규제봉 470개

□ 문제점 및 대책

○ 교통안전시설 관련 민원 년간 560건 접수

➩ 단가계약 시행으로 여러 장소의 수시요구 민원 신속처리

□ 금후계획

○ 민원 및 관할경찰서 요구 장소 우선시행 완료 -- 2007. 12

신호등 설치․이설 집약화 사업

○ 안전사고가 많이 발생하는 교차로내 신호등 설치․이설 및

개선으로 사고를 감소시켜 시민의 인명과 재산보호

○ 교차로내 많은 시설물이 난립 설치되어 도시경관 저해 및

보행공간 불편을 해소하기 위하여 통합 설치

□ 사업개요

○ 시설현황 : 신호등 431개 교차로

○ 2006년까지 추진상황

- 사업내용 : 184개 교차로 (2,650백만원)

○ 2007년 계획

- 사업내용 : 16개 교차로(신호등 설치, 이설, 집약화, 횡단보도조명보수)

- 사 업 비 : 500백만원

□ 추진상황 - 공정 80%

○ 신호등 신설 : 3개소 완료(부영2차@3지, 서곡LG@3지, 여울초3지)

○ 경보등 신설 : 1개소 완료(미산교)

○ 위치 이설 및 집약화 : 8개소 완료(백제로, 화산로)

○ 횡단보도 조명등 보수 : 50개소 완료

□ 문제점 및 대책

○ 신호등 설치요구 민원은 많으나 경찰서 교통규제심의위원회에 상정 결과에 따라 우리시가 설치함으로 모든 민원 수용 불가

➩ 단가 계약으로 신호등 설치기준에 의한 민원사항은 신속 처리

➩ 신호등 신설 및 이설 할 때 집약화 병행 추진

□ 금후계획

○ 교통규제심의 가결된 신규신호등 설치 1개소(개선형 신호등)

○ 화산로 선너머4지, 서중 4지 이설 및 집약화 완료 - 2007. 12

※ 집약화 : 신호등 + 가로등 + 보행등 + 교통표지판 + 도로표지판 + 공공안내표지판

교통사고 줄이기 본부 설치 운영

○ 사회적 공감대를 형성하여 시민이 동참하고 함께 만들어 가는

선진교통문화도시 조성

○ 교통사고 OECD선진국 수준으로 감소시키기 위한 여건마련

- 자동차 1만대당 사망자 목표 2.0인 이하(‘06년 3.4인)

□ 사업개요

○ 구   성 : 15개 유관단체 (공동본부장: 전주시장외 6개 기관장)

- 전주시,완산․덕진경찰서, 시교육청, 언론사, 교통안전공단, 도로교통안전관리공단, 새교육공동체시민연대, 안실련, 손해보험협회, 운송사업조합, 녹색어머니회, 대한노인회, 시내버스공동위원회, 교통서포터스

○ 역   할

- 민․관․단체가 함께하는 선진교통문화 의식교육과 홍보, 캠페인 등

교통사고 줄이기 운동을 종합적으로 수행하는 구심체 역할

- 우리지역 교통사고 발생원인, 유형, 특성 등을 분석 사고

예방법 홍보, 재 발생 방지, 캠페인 등을 종합적으로 수행

- 교통약자에 대한 안전교육 프로그램 도입 운영

․ 어린이 안전교육 : 정보센터 교육장 활용 및 초등학교, 유치원 찾아가는 교육

․ 노인 안전교육 : 동 자치센터 및 노인정 활용

․ 어르신 안전지도자 양성 : 소정의 교육 이수 후 지역 교통사고 예방활동 활용

○ 소요사업비 : 140백만원

□ 추진상황

○ 유관단체 실무자 간담회, 준비 실무 협의회(3회) --- 2007. 1~ 3

○ 교통사고 줄이기 본부 창립대회 개최 -------- 2007. 4. 12

○ 추진위원회 개최 및 교통사고현장 대책유관기관회의 11회 시행 조치

○ 찾아가는 교통안전교육 등 시행 : 131개소 138회 15,980명

○ 어린이 교통안전 뮤지컬 유치 공연 : 5. 8~5. 9(2일간) 1,680명 관람

○ 교통사고 예방 워크샵 개최(유관기관 73명참석, 교통안전공단주관)-9.28

○ 교통안전체험 위탁교육단체 선정 교육프로그램 운영 중 - 9월~12월

- 어르신 안전지도자 양성교육 및 하굣길 교통안전지도 운영

- 어린이 교통체험교육 위탁운영, 찾아가는 교육 지속

교통 정보 ․ 신호 시스템 효율적 운영관리

○ 교통정보․신호 시설물의 증가 및 장비 노후화로 장애 발생

➩ 전문업체 용역 관리

○ 신속․정확한 교통상황 정보제공 및 효율적 운영으로 시민편익 증진

□ 사업개요

○ 사 업 비 : 600백만원

○ 사업내용

- 교통신호시설물 및 BIS시스템 유지관리 용역

․ 신호 : 주전산장치, 교통상황판, 신호제어기 396대, CCTV 39개소

․ BIS : 승강장안내기 136개소, 노변기지국 233개소

- 교통신호 DB구축 및 운영관리 용역

․ 내용 : 교통량 조사, 현시방법 및 현시값 조정, 주기조정, 연동값 조정

□ 추진상황

○ 교통신호시설물 및 BIS시스템 유지관리 용역 - 2007.3~2008.2

- 용역업체 : 지에스 네오텍 (계약금액: 410,337 천원)

- 신호시설물 유지관리 : 131회,  연인원 1,040명 동원

- BIS시스템 유지관리 : 547회,  연인원 620명 동원

- 노선체계 변경에 따른 노선정보 변경 완료 ----------- 2007. 4

- 노선개선명령에 따른 노선정보 수정 2회 완료 - 2007. 7월,10월

○ 교통신호 DB구축 및 운영관리 용역 ----- 2007.6~2008.4

- 용역업체 : 도로교통안전관리공단 (계약금액: 82,000 천원)

- 신호 DB개선 : 617건 완료

- 신호등 민원처리 : 107건 처리

□ 금후계획

○ 교통신호 및 BIS시스템 최적의 운영 유지관리

도 로 과  소 관

ꊱ	남부순환도로 개설 -------------------	25
ꊲ	전주 진입로 확장 ----------------------	26
ꊳ	원대 한방병원~가련교간 도로개설 -------	27
ꊴ	전통문화가 어우러진 남천교 가설-------	28
ꊵ	한옥마을 테마관광로(은행로)조성-----	29
ꊶ	남도주유소~고속터미널간 도로확장 ------	30
ꊷ	우전로(서곡광장~서부신시가지) 확장----	31
ꊸ	쑥고개길 안행교~효자광장 도로확장 -----	32
ꊹ	동산고 가교 접속도로 확장-------------	33
	대학로개설 관련 전북대 시설지원사업---	34
	세내길(우림교~포스코)개설-------	35
	중앙분리대 설치-------------	36
	아름다운 교량 및 터널 만들기 용역 ------	37
	자전거 보관대 설치 및 정비 ------------	38
	소송 패소 토지 및 미불용지 매입--------	39
	서남권 국토 대체 우회도로 건설----------	40
	북부권 국도 대체 우회도로 건설----------	41
	전주~논산간 고속도로 확장 ------------	42
	전주~광양간 고속도로 건설---------	43
	익산~전주~장수간 고속도로 건설------	44
	도로안내 표지판 정비---------------	45
	아름다운 간판디자인 및 시스템 개발용역---	46
	관내 외곽지역 가로등 신설-------------	47
	지하차도 및 터널 조도개선사업----------	48
	전주천 교량 야간경관 조명설치--------	49
	주요도로 가로등 조도개선------------	50

남부순환도로 개설

○ 서남권 지역의 교통량을 외곽으로 분산시켜 도심교통난 해소

○ 외곽 도로망 구축으로 주변의 발전 기틀 및 교통편익 제공

□ 사업개요

○ 구    간 : 서서학동 공수교～동서학동 좁은목

○ 사 업 량 : 연장 1,560m, 폭 25～35m

○ 사 업 비 : 36,800백만원(보상 21,600, 공사 15,200)

○ 사업기간 : 1998 ～ 2010(13년)

□ 추진상황(전체공정 60%)

○ 공수교～거산황궁ⓐ～무궁화주유소간 공사완료 --- 1998.1～2005.9

○ 전일연립~산성천간 토지 및 지장물보상 ----- 2007.2～현재

○ 전일연립 10세대 수용재결 신청 및 재결------ 2007.5~7

○ 행정심판청구(대집행계고처분취소청구)-------- 2007.10.16

○ 전일연립주택(가동) 철거완료 ----------------- 2007.10.31

※ 투자액 : 24,057백만원(기투자 18,557, 2007년 5,500)

□ 문제점 및 대책

○ 산성천~좁은목(420m)구간의 건물노후로 붕괴 위험이 있어

조기 보상 및 잔여구간 도로 조기개설 요구

➩ 민원해소를 위해 잔여사업비(12,743백만원) 확보

○ 전일연립주택(나동) 행정대집행 정지 결정

➩ 행정심판 결과에 의거 건물철거(2007. 12월 이후)

□ 금후계획

○ 전일연립주택~산성천간 공사추진 ----- 2007.10~2008.12

○ 전일연립(나동)철거 및 폐기물 처리 --- 2007.12~2008.02

○ 잔여구간 보상 및 공사추진 ----------- 2008.01~2010.12

전주 진입로 확장

○ 우리시 관문인 전주진입로 정비로 쾌적한 도시환경 제공

○ 도로 미확장구간 확장으로 병목해소 및 교통편익증진 도모

□ 사업개요

○ 구    간 : 덕진동 원대한방병원～팔복동 BYC

○ 사 업 량 : 연장 1,320m, 폭 35➩50m

○ 사 업 비 : 17,000백만원(보상 10,000. 공사 7,000)

○ 사업기간 : 1999 ～ 2008(10년)

□ 추진상황(전체공정 75%)

○ 원대한방병원～추천대교간 확장완료(710m) - 1999. 1～2003.12

○ 추천대교～BYC측(610m) 확장완료 ------ 2004. 3~2006.12

○ 추천대교~전북은행측(610m) 보상추진 ----- 2007. 2～현재

- 토지 14필지중/11필지(79%), 지장물 32건중/27건(84%) 협의 완료

- 이주대상 건축물 9동중 4동 철거완료

○ 원대한방병원~전북은행간(8차공사)착공 ------- 2007.10.8

- 가로수(64그루) 및 수벽 이식, 옹벽43m 완료

※ 투자액 : 14,486백만원(기투자 11,986,  2007년 2,500)

□ 문제점 및 대책

○ 토지 1필지 및 영업보상 1건 협의매수 불응

➩ 지토위 재결신청하여 결과에 따라 보상, 수용

□ 금후계획

○ 확장공사(8차분) 추진 : 이주지장물 철거 및 지하매설물 설치

○ 추천대교~전북은행측 도로확장 완료 -------- 2008. 1~12

원대한방병원~가련교간 도로개설

○ 하가택지개발사업 시행으로 인근의 도로개설 절대 필요

○ 송천동과 서부지역을 연결하는 도로개설로 시내교통난 해소

□ 사업개요

○ 구    간 : 덕진동 도립국악원 ～ 덕진동 가련교간

○ 사 업 량 : 연장 1,400m, 폭 35m

○ 사 업 비 : 27,000백만원(보상 10,000, 공사 17,000)

○ 사업기간 : 2005 ～ 2008(4년)

□ 추진상황(전체공정 30%)

○ 도립국악원~하가택지경계간 보상추진 ------- 2007.3～현재

○ 2차공사 시행(하가택지경계~한방병원뒤) --- 2007.7~현재

○ 미협의 토지 및 지장물 토지수용 재결신청 ------ 2007.9.4

- 토지 31필지중/4,356m2, 지장물 등 9건

※ 투자액 : 19,560백만원(기투자 2,060,  2007년 17,500)

□ 문제점 및 대책

○ 대절토부 암 발파시 소음․진동으로 입원환자 피해 발생 우려

□ 병원 및 지역주민과 사전 협의 방호․방음벽 설치후 공사시행, 민원최소화

○ 협약사항 이행 유보요청(토공전북본부):토지공사 자금사정과

(쓰레기 매립처리, 조경공사)택지개발이익금(50억원)담보불투명

□ 납부기한 연기:결산 추경 삭감(세입,세출)후 2008 본예산 확보 추진

□ 금후계획

○ 도립국악원~한방병원 공사 추진 -------- 2007.10~2008. 4

○ 대절토부 암 절취 및 택지개발지구 성토 - 2007.10~2008.10

○ 준   공 --------------------------------------- 2009.12

전통문화가 어우러진 남천교 가설

○ 한옥마을ㆍ한벽루등 자연형 하천과 어우러진 특색있는 교량  가설로 가장 한국적인 전통문화도시의 이미지 부각

○ 통과ㆍ연결기능에서 쉬어가는 휴식공간을 확보 주변 환경과  조화를 이루도록 하여 천년전주 상징화

□ 사업개요

○ 구    간 : 은행로 ~ 전주천좌안도로

○ 사 업 량 : 교량가설(L=80m,B=16m), 하천공작물(L=80m,B=9m)

○ 사 업 비 : 12,000백만원(공사)

○ 사업기간 : 2006 ~ 2009(4년)

□ 그간 추진상황(전체공정 10%)

○ 한옥보존위원회및 설계자문위원회 자문 -- 2004.1~2004.9

○ 시의회 도시건설위원회 간담회 -------------- 2006.12.21

○ 기본 및 실시설계용역 착수 ------------------ 2007.4~12

○ 경관․디자인 심의위원회(2회-“안”확정) ------- 2007.7, 9

○ 주민설명회(경관․디자인 확정“안”) ----------- 2007.10.4

○ 남천교 실시설계 완료 및 설계자문위원회 자문중 --- 2007.11∼

※ 투자액 : 1,208백만원(기투자 500, 용역비 708)

□ 문제점 및 대책

○ 총 소요공사비(95억원 정도) 미확보에 따른 차수별 공사추진

□ 1차분(기존교량 철거, 폐기물처리 등) 2007.12.20 착공

전체분 공사마무리 : 2009년 12월

○ 무형문화유산전당 건립 조건이행(문화재청)을 위한 인도교

(테마관광교)는 금년도 설계 마무리후 국비보조사업으로 추진

□ 금후계획

○ 설계자문위원회 자문완료 및 공사발주 ------- 2007.11.15

○ 남천교 가설공사(1차분) 착공 --------------- 2007.12.20

○ 준   공 ----------------------------------- 2009.12

한옥마을 테마 관광로(은행로) 조성

○ 한옥마을을 찾는 국내외 관광객들의 안전한 보행권 확보

○ 가장 한국적인 전통문화 이미지를 반영 관광명소로 부각

□ 사업개요

○ 구    간 : 교동 남천교～동부시장

○ 사 업 량 : 연장 980m, 폭 8 ⇒ 12m

○ 사 업 비 : 13,060백만원 (당초 9,500백만원)

○ 사업기간 : 2005 ～ 2008(4년)

□ 그간 추진상황(전체공정 50%)

○ 착공 및 이주건물철거 완료 --------------- 2006.4～2007.5

○ 지하수개발(2공-각각 200톤/일)․수질검사결과 적합 --- 2007.4

○ 한전지중화공사협약체결․지하매설물 굴착 경찰서 협의 -------- 2007.4

○ 쌈지공원․실개천 조성계획 확정(정책조정회의) ---- 2007.5

○ 시의회 간담회 및 주민설명회 ----------------- 2007.4~5

○ 지하매설물 굴착 완료 ----------------------- 2007.6~10

※ 동문네거리길~충경로(L=102m)구간 : 2008.5월중 추진

○ 총괄 설계변경, 잔여분(2차) 계약 ------------ 2007.9~2008.10

※ 확보액 : 12,340백만원(보상 3,610, 공사 8,730)

□ 문제점 및 대책

○ 돌포장 구간 바닥 콘크리트 타설 및 양생기간동안 교통통제로 인근 상가 영업보상 민원발생 예상(최소 3주간 : 강도70~75%)

⇨ 인도→차도순으로 교통통제기간 최소화 및 인근 상가 방문

설득 및 관할경찰서 교통통제 협조 요청

□ 금후계획

○ 양방구간 아스콘포장(동문네거리길~경기전뒷길, 향교로~가리네길) - ’07.11.30

○ 일방구간 차도 돌포장 완료

- 경기전 뒷길~태조로(’08.1.30),  - 태조로~향교로 (’08.2.29)

○ 일방구간(태조로~향교로) 인도 판석 포장 완료 ---- ’08.3.30

○ 쌈지공원 조성, 가로수 식재, 가로등, 야간 경관조명 완료 --- ’08.4.20

○ 도로확장 완료 및 개통 ------------------------- ’08.6.30

※ 동절기 공사중지 없이 2008년 문화축제 이전 완공 목표로 공사 추진

남도주유소～고속터미널간 도로확장

○ 도로확장 및 보도설치로 보행자와 고속터미널 이용자들의

편익증진 도모

○ 노후건물 재건축등으로 도시미관 제고 및 침체지역 활성화

□ 사업개요

○ 구    간 : 금암동 남도주유소～고속터미널간

○ 사 업 량 : 연장  500m,    폭 20 ⇒ 23m

○ 사 업 비 : 3,200백만원 (보상 1,700. 공사 1,500)

○ 사업기간 : 2004 ～ 2008(5개년)

□ 추진상황(전체공정 20%)

○ 도시계획 도로폭 축소(25m⇒23m)결정 -------------- 2005.6

○ 실시설계용역 완료 ---------------------------------- 2006.2

○ 보상추진(터미널～남도주유소/200백만원) ----- 2005.12～2006.1

○ 도시계획사업실시 계획인가(전북고시 2007-74호) - 2007.8.24

○ 사업비 5억원 확보(추경)

- 감정평가 완료(24필지) ------------------------ 2007.10.9

- 편입토지 보상협의 통보  ---------------------- 2007.10.24

※ 투자액 : 700백만원(기투자 200,  2007년 500)

□ 금후계획

○ 용지매입추진  -------------------------------- 2007.11~12

○ 용지매입 및 도로확장 완료  --------------- 2008.3~2008.12

우전로(서곡광장~서부신시가지) 확장

○ 신시가지 지구내 도로준공에 따른 연계도로 확장시급

○ 도로확장으로 보행권 확보등 안전사고 및 교통체증 해소

□ 사업개요

○ 구    간 : 효자동 서곡광장～서부신시가지 경계

○ 사 업 량 : 연장 1,200m, 폭 20 ⇒ 35m

○ 사 업 비 : 4,500백만원(보상 2,000, 공사 2,500)

○ 사업기간 : 2007 ～ 2009(3년)

□ 추진상황

○ 서곡지구 택지개발시 부분개설(폭 20m) ------- 1997년도

○ 추경예산 확보 350백만원(실시설계 150, 가각정리 200)

○ 실시설계 용역 발주  -----------------------  2007. 9. 7

○ 지방재정계획심의  ------------------------  2007. 10.30

- 조건부 추진 : 서부신시가지조성 도시개발특별회계 부담 재원 방안 마련후 추진

○ 서곡광장 가각정리 및 변속차로시설 설계사전심사 의뢰 - 2007.10.31

□ 금후계획

○ 서곡광장 가각정리 및 변속차로 시설공사 착수 -- 2007.11.20

○ 우전로 실시설계용역 완료 ---------------------- 2008.1

○ 편입토지 및 지장물 보상 ------------------- 2008.1~12

○ 준   공 ----------------------------------- 2009.1~12

쑥고개길 안행교~효자광장 도로확장

○ 주공 4, 5단지 택지개발 및 대규모 공동주택 개발에

따라 장차 교통량 증가로 극심한 교통체증 예상

○ 택지개발 및 대규모 공동주택개발 완료 전 도로를 확장함으로써      교통체증 사전해소

□ 사업개요

○ 구    간 : 효자동 안행교사거리～효자동 효자광장

○ 사 업 량 : 연장 530m, 폭 25m ⇒ 35m

○ 사 업 비 : 9,000백만원(시비 4,800,  민간자본 4,200)

○ 사업기간 : 2007 ～ 2009(3년)

□ 추진상황

○ 효자4,5지구 택지개발 실시계획승인(주공) ------ 2005. 6

➢ 실시계획 협의조건에 따라 사용검사일 이전까지 전주시에서 개설해야 됨

- 사용검사 예정일 : 4지구 - 2007. 12월, 5지구 - 2010년

○ 우림교~안행교간(630m) 주공에서 공사시행중 - 2005.7~2007.11

○ 효자주상복합 신축 교평 심의의결 ---------- 2007. 3. 30

- 사업대상지 전면 도로개설사업비 효자광장쪽으로 STS개발에서

개설토록 결정

○ 실시설계 용역 발주  -------------------------- 2007.9.7

- 측량,현장조사 완료, 종․ 횡단계획 작업중

○ 지방재정계획심의  -------------------------  2007.10.30

- 조건부 추진 : 확장구간 사업비 효자주상복합 사업자와 명확히 협의 추진

□ 금후계획

○ 실시설계용역 완료 ---------------------------- 2007. 1

○ 편입토지 및 지장물 보상 ------------------ 2008. 1~12

○ 준   공 ---------------------------------- 2009. 1~12

동산고 가교 접속도로 확장

○ 동산고가교 접속도로 진,출입부 미 확장으로 병목현상 초래

○ 도로확장으로 교통사고 위험 해소는 물론 차량소통 원활 기여

□ 사업개요

○ 구    간 : 동산동 동산 고가교 ～ 동산역

○ 사 업 량 : 연장 340m, 폭 18.5➩35m

○ 사 업 비 : 2,990백만원(보상 1,700, 공사 1,290)

○ 사업기간 : 2003 ～ 2007(5년)

□ 추진상황(전체공정 100%)

○ 상행선(동산역～동산고가교 : L=340m) 완료 ------ 2005. 05

○ 하행선(동산고가교 옆 : L=100m) 완료 ---------- 2006. 12

- 용수로 복개 L=20m, 상ㆍ하수도 L=538m ,인도 L=100m 등

○ 하행선(동산고가교～아중역 앞 : L=240m) 완료 ----- 2007. 06

○ 준 공 ---------------------------------------- 2007. 07

※ 투자액 : 2,990 백만원 (기투자 1,590, 2007년 1,400)

대학로 개설 관련 전북대 시설지원사업

○ 도시가로망 확충을 위한 대학로 개설내 국유지 대체시설지원

○ 국유지사용 대체시설 협약체결 사업으로 행정의 신뢰성 제고

□ 사업개요

○ 구    간 : 전북대학교내

○ 사 업 량 : 대운동장보수 1식, 학군단증축 350㎡

동물병원후면 배수Box L=45m(3×2×2련)

○ 사 업 비 : 2,069백만원(21필지 31,470㎡)

○ 사업기간 : 2004～2007(4년)

□ 추진상황(전체공정 100%)

○ 대학로 내 국유지사용 대체시설 협약체결 -------- 2003. 12

○ 학군단 방음벽시설 완료 ----------------------- 2004. 12

○ 대운동장 보수공사 완료 ----------------------- 2006. 06

○ 배수BOX시설 완료 --------------------------- 2007. 08

○ 준 공 ---------------------------------------- 2007. 08

※ 투자액 : 2,069 백만원 (기투자 1,340, 2007년 729)

세내길(우림교~포스코) 개설

○ 대단위 신축아파트 밀집지역의 진출입로 미개설로 교통체증 심각

- 아파트 1,918세대가 2005. 9～2007. 5 입주 완료

○ 서부신시가지와 연계되는 주요 노선으로 도로개설이 시급함

□ 사업개요

○ 구    간 : 효자동 우림교～포스코 APT 앞

○ 사 업 량 : 연장 356m, 폭 25m

○ 사 업 비 : 5,300백만원(보상 2,200, 공사 3,100)

○ 사업기간 : 2006 ～ 2008(3년)

□ 추진상황(전체공정 25%, 1차공정 40%)

○ 분할측량 및 실시설계용역 완료 --------------- 2007. 02

○ 보상협의 추진완료(8필지) -------------------- 2007. 05

○ 공사계약 및 1차사업(교량가설) 착공 ----------- 2007. 09

- 교대기초 및 구체콘크리트 타설 --------------- 2007. 11

※ 투자액 : 2,100백만원(기투자 500, 2007년 1,600)

□ 금후계획

○ IPC거더 제작 ------------------------------- 2007. 11

○ 1차사업 완료 ---------------------------------- 2008. 03

○ 2차사업 계약 및 착공 -------------------------- 2008. 03

○ 준 공 ----------------------------------------- 2008. 12

중 앙  분 리 대  설 치

○ 중앙선 침범 및 무단횡단으로 인한 도심교통사고 예방

○ 도로중앙화단 수목식재로 녹색가로환경 조성 및 도심 열섬

해소 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 교통사고 잦은 주요 간선도로(4차선 이상 도로)

○ 사 업 량 : 41개 노선 61.6㎞

○ 사 업 비 : 13,500 백만원 (국비 6,750, 시비 6,750)

○ 사업기간 : 2002 ～2011(10년)

□ 추진상황

○ 중앙분리대 정비계획 수립 -------------------- 2003. 06

○ 사 업 량 : 16개 노선 24.3㎞

- 화단형 16.0㎞, 방호형 4.0㎞, 수벽 4.3㎞

※ 투자액 : 7,128 백만원 (기투자 7,033, 2007년 95) 53%

○ 2007년 사업완료 : 쑥고개길 3개소 0.4㎞

□ 금후계획

○ 안덕로 중앙분리대 설치 (기린로 ~ 전주생명과학고)

- 구    간 : 기린사거리 ～ 전주생명과학고 (연장 0.5㎞)

- 소요예산 : 128 백만원 (국비 64, 시비 64)

아름다운 교량 및 터널 만들기 용역

○ 설치가 오래된 교량의 난간을 현대적 감각으로 리모델링

하여 전통문화도시 이미지 제고

○ 동․서간 연결터널이 준공 후 10여년이 지나 퇴색되고 어두운

터널을 새롭게 정비하여 안전한 통행유도

□ 사업개요

○ 대상시설물 : 8 개소 (교량 6, 터널 2)

- 교  량 : 추천대교, 다가교, 싸전다리, 한벽교, 서곡교, 우림교

- 터  널 : 어은터널, 진북터널

○ 총사업비 : 5,600 백만원 (시비)

○ 사업기간 : 2007 ～ 2010 (4년)

※ 2007시범사업 : 서곡교, 어은터널, 진북터널

□ 추진상황

○ 용역과제 심의 완료 -------------------------- 2006. 10

○ 실시설계용역 계약 및 착수(50백만원) --------- 2007. 04

○ 도시시설물 디자인 심의(아트폴리스위원회) ---- 2007. 11

□ 문제점 및 대책

○ 용역비 부족으로 대상 시설물 일시 용역추진 지난

➩ 시범사업으로 전주 관문에 위치한 서곡교,어은터널,진북터널 추진

□ 금후계획

○ 실시설계 용역 완료 -------------------------- 2007. 12

- 교량 : 조형난간 및 야간경관 조명설치 등

- 터널 : 벽면 리모델링 및 주변 조경 등

자전거 보관대 설치 및 정비

자전거를 이용하는 시민에게 편의를 제공함으로서 자전거

타기를 활성화하여 시민들의 건강을 도모하는 한편 에너지

절약에 기여코자 함.

□ 사업개요

○ 위    치 : 시내 일원에 자전거 보관대 설치

○ 사 업 량 : 자전거보관대 100개소 (신설 54, 보수 46)

○ 사업기간 : 2007. 7 ～ 2007. 12.

○ 사 업 비 : 153 백만원(국비 100, 시비 53)

□ 추진상황

○ 자전거 보관대 실태조사 ---------------------- 2007. 08

○ 공사계약 및 착공 ---------------------------- 2007. 10

○ 기존 보관대 보수 완료 ----------------------- 2007. 11

○ 보관대 제작 및 설치(70％) ------------------- 2007. 11

□ 금후계획

○ 보관대 설치 완료 ---------------------------- 2007. 12

소송 패소 토지 및 미불용지 매입

미불용지 및 소송 패소 토지 미 보상으로 장기간 민원이 제기

되어 왔던 토지를 조기 매입함으로서 민원 해소

□ 사업개요

○ 보상대상토지 : 63건 29,250㎡

○ 매입 예상액 : 5,800백만원

○ 사 업 기 간 : 2007 ～ 2010(4년)

□ 추진상황

○ 토지매입 : 51건  4,155백만원

- 2004년 : 10건  780백만원

- 2005년 : 11건  1,599백만원

- 2006년 : 17건  998백만원

- 2007년 : 상반기 : 13건 778백만원

□ 문제점 및 대책

○ 한정된 예산으로 인해 소송패소 토지에 대한 보상민원이

끊이지 않고 있음

⇒ 민원의 수위를 완화하기 위해 장기민원 토지부터 우선매입함

□ 금후계획

○ 2007년 예산 잔액집행

- 대상토지 : 13필지 2,265.9㎡

- 민 원 인 : 11명

- 추 정 가 : 219백만원

서남권 국도 대체 우회도로 건설

〈계속 ․ 국가사업〉

○ 시가지를 통과하는 국도1호, 17호, 27호선과 지방도 712호,

716호, 749호선의 교통량을 분산하여 시내권 교통정체 해소

○ 서남부지역 원활한 물동량 이동의 중심기능을 강화함으로써   지역개발 촉진 및 광역도시 발전기반 구축

□ 사업개요

○ 구    간 : 완주군 상관∼구이∼이서∼용정∼익산시 춘포

- 완공예정 : 구이∼용정(2008년), 용정∼춘포(2010년)

○ 사업규모 : 33.4km(폭 20m) ※ 전주시 구간 13.4㎞

○ 사 업 비 : 4,676억원(국비 4,368, 시비 308)

○ 사업기간 : 1998 ∼ 2010(13년)

○ 시 행 청 : 익산지방국토관리청(보상 : 전주시)

□ 추진상황

○ 상관 ∼ 구이간(L=8.9㎞)개통 ----------- 2005. 4.20

○ 공사 및 보상금 확보액 : 4,157억원(국 3,849, 시 308)

- 공사 및 보상실적     : 4,143억원(국 3,849, 시 294)

- 구간별 공정 : 구이～이서(84%),이서～용정(74%),용정～춘포(54%)

○ 중앙 토지수용위원회 수용재결신청 ----------- 2007. 6.29

- 이서～용정구간 20필지 18,071㎡/ 재결금액 994백만원

□ 금후계획

○ 용지보상 실시(용정~춘포)   : 18필지 13,931㎡/ 406백만원

○ 토지수용 재결 공탁(12월중) : 19명 / 994백만원

○ 공사추진 : 구이~춘포구간 성토 및 공사(L=24.5km)

북부권 국도 대체 우회도로 건설

〈계속 ․ 국가사업〉

○ 시가지 통과 국도17, 27호선 교통량 분산으로 시내권 교통정체 해소

○ 북동부지역 원활한 물동량 이동의 중심기능을 강화함으로써   지역개발 촉진 및 광역도시 발전기반 구축

□ 사업개요

○ 사업구간 : 조촌 용정∼용진(구간축소)～아중역(1단계)～색장리(2단계)

※ 2 단계구간(아중역～색장) 전주~광양고속도로 교통수요 예측 후 개설

○ 사업기간 : 2006 ∼ 2013(9년)

○ 사업규모 : L= 11.2km, B= 20m(전주시 구간 : 8.4㎞)

○ 사 업 비 : 2,140억원(국비 1,970, 시비 170)

○ 시 행 청 : 익산지방국토관리청(보상 : 전주시)

□ 추진상황

○ 공사계약 및 교량 구조물 공사 착공 ------ 2006. 6. 28

○ 편입용지 분할측량 완료 ----------------- 977필지 634,707㎡

○ 1단계(용정～아중역)에서 축소된 구간(용진～아중역) 연장건의

- 연장 규모 : L= 7.4km(전주시 구간 : 4.4㎞)

- 사 업  비 : 900억원(공사비 817, 보상비 83)

○ 용지보상 완료 --------------------------- 5필지/ 2억원

□ 문제점 및 대책

○ 용정～용진까지 사업구간 축소로 국도대체우회도로 역할 미흡

- 공문발송(2007.4.30), 건교부 관련부서 방문건의(4회)

□ 금후계획

○ 반월교차로 및 구증교 주변 용지보상 예산확보 필요 : 시비 35억원

※ 2008년 공사비 확보(국비) : 85억원

전주∼논산간 고속도로 확장

〈계속 ․ 국가사업〉

○ 천안∼논산간 고속도로 개통에 따른 교통정체 해소

○ 논산∼전주간, 전주∼광양간, 익산∼장수간 고속도로 연결로 물류비용 절감

○ 행정수도 연계 교통망 구축으로 지역균형발전의 활성화 도모

□ 사업개요

○ 구    간 : 전주 ～ 삼례 ∼ 논산간

○ 사업규모 : 연장 17.0km, 폭 4차로➩6∼8차로

○ 사 업 비 : 3,500억원(국비)

- 삼례～논산 구간 사업비 : 2,143억원

○ 사업기간 : 2002 ∼ 2008(7년)

○ 시행기관 : 건설교통부(한국도로공사)

□ 추진상황 --------- 682억원(국비)

○ 공사발주 및 착공 -------------------- 2005.12.27

○ 삼례∼논산 구간 공정 : 30%

□ 문제점 및 대책

○ 미 발주 구간인 전주∼삼례간은 전라선 복선전철화(익산～신리)       2011년 개통을 위해서 시급히 확장 필요

- 건교부 및 한국도로공사 공문발송 건의(2007.7.2)

□ 금후계획

○ 편입용지 보상 및 공사 추진중

※ 준공예정 : 2010년(2005년 착공, 절대공기 부족으로 공기연장 불가피)

전주∼광양간 고속도로 건설

〈계속 ․ 국가사업〉

○ 군장산업단지와 광양만 산업단지의 연결도로망 구축 시급

○ 호남고속도로 및 익산∼장수간 고속도로의 연결로 고속도로

이용율 제고 및 산업 경쟁력 증진

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주 ∼ 남원 ∼ 광양간

○ 사업규모 : 연장 117.8km(전주시 구간 7.78㎞)

○ 사 업 비 : 28,231억원(국비)

○ 사업기간 : 2003 ∼ 2011(8년)

○ 시 행 청 : 건설교통부(한국도로공사)

□ 추진상황 --------- 7,650억원(국비)

○ 기본 및 실시설계․환경영향평가 등 행정절차 완료 -- 2003. 12

○ 전주～남원구간(60.7㎞) 공정 : 42%(2004. 12. 30착공)

□ 금후계획

○ 편입용지 보상 및 도로 축조공사

※ 준공예정 : 2010년(1년 조기완공 : 광양만 배후 도로망 구축)

익산∼전주∼장수간 고속도로 건설

〈계속 ․ 국가사업〉

군․장 산업단지 등 서해안 공업지대와 동․남해안 공업지대를

연결하는 도로망 구축으로 물류비용 절감

□ 사업개요

○ 위    치 : 익산 ∼ 전주 ∼ 장수간

○ 사업규모 : 연장 61km, 폭 4차로

○ 사 업 비 : 12,164억원(국비)

○ 사업기간 : 2001 ∼ 2008(8년)

○ 시 행 청 : 건설교통부(한국도로공사)

□ 추진상황 --------- 12,164억원(국비전액 확보)

○ 용지보상 완료

○ 도로축조 및 구조물 시공

○ 건축공사 등 기타공사 시행중

□ 금후계획

○ 도로 축조공사 추진 및 마무리 공사시행

※ 준공예정 : 2007. 12. 13

도로 안내 표지판 정비

전주를 찾는 방문객․통행인에게 쉽고 편리한 목적지 안내에

기여 및 아름다운 도시가로망 조성

□ 사업개요

○ 사 업 량 : 표지판 정비 120개소

○ 사 업 비 : 120백만원

○ 사업기간 : 2007. 4.  ~ 2008. 1.

□ 추진상황

○ 사업발주 -------------------------------------------------- 2007. 3. 23

○ 착    공 -------------------------------------------------- 2007. 4. 19

○ 추진실적(1․2차) : 144개소 정비완료

- 정비내용 : 문자수정 131, 판교체 7, 신설 4, 이설 1, 재설치 1

- 집 행 액 : 111,400천원

- 잔    액 :   8,600천원

□ 금후계획

○ 민원요구사항 등 3차 정비 실시(잔액분) ------- 2007. 12.

아름다운 간판디자인 및 시스템 개발용역

전주시 전통문화중심도시의 거리특성에 맞는 옥외간판 조성기본계획을   수립하고 기본계획에 맞는 옥외간판의 디자인(글꼴,색상,형태등) 및 시스템을    개발 기준 제시하여 거리에맞는 차별화되고 아름다운 옥외간판을 제작,    설치함에 있어 활용하여 난립된 옥외간판을 탈바꿈하는데 있음

□ 용역개요

○ 대상간판 : 가로형간판 등 옥외광고물

○ 주요내용

- 신규 택지개발지역의 간판설치규격 및 수량등 가이드라인 개발

- 우리시 특성에 맞은 간판의 글꼴,색체,형태 등 표준디자인 개발

○ 용 역 비 : 50백만원(추경확보)

○ 용역기간 : 2007. 10 ~ 2008. 3

□ 추진상황

○ 수도권 우수지자체 현지견학 -------------------- 2006. 12. 6

○ 용역과제심의완료 ------------------------------ 2007. 5. 28

○ 계약완료(호원대학교 산학협력단)------------- 2007.10.5

○ 착    수 ----------------------------------- 2007.10.9

○ 아트폴리스 위원회 자문의뢰 ------------------- 2007. 10. 25

□ 금후계획

○ 아름다운 간판 시범거리 조성사업비 신청(행자부) ---------2007. 11

○ 중간 보고회 개최 ------------------------------- 2007. 12

○ 최종 보고회 개최 ------------------------------- 2008.  2

○ 용역 납품 ----------------------------------- 2008.  3

관내 외곽지역 가로등 신설

○ 관내 외곽지역 및 교통사고 다발지역에 가로등 신설

○ 교통사고 예방 및 밝은 밤거리 조성으로 주민 불편해소

□ 사업개요

○ 위    치 : 관내 외곽지역 및 교통사고 다발지역

○ 사업내용 : 가로등(한전주 이용) 신설

○ 사 업 량 : 가로등 79개소 신설(L= 1,600m)

○ 사업기간 : 2007. 2 ～ 12월(년중 단가계약 시행)

○ 사 업 비 : 100백만원

□ 추진상황

○ 평화동 두산아파트 진입로  (12개소) ---------- 2007. 3

○ 성덕동 성덕마을 진입로     (9개소) ---------- 2007. 4

○ 우석대한방병원 진입로      (8개소) ---------- 2007. 5

○ 팔복동 추천대교 천변길    (17개소) ---------- 2007. 7

○ 삼천(세네교~마전교) 둔치 (25개소) ---------- 2007. 8

○ 삼천(삼천교~세네교) 둔치  (8개소) ---------- 2007. 9

※ 가로등 79개소 신설(L=1,600M)로 금년 사업비 집행완료

□ 금후계획

○ 2008년 가로등 신설 대상지역 현지조사 ------- 2007. 12

※ 관내 외곽지역 및 교통사고 다발지역등에는 도로개설시 가로등이 설치되지 않아 교통사고에 취약한 실정으로 사업예산 충분히 확보필요

지하차도 및 터널 조도개선사업

○ 관내 지하차도 및 터널의 조명이 어둡다는 민원이 빈번하게 발생

○ 지하차도 및 터널 내부의 조도를 밝게 개선하여 운전자에게

밝고 안전한 차량운행

□ 사업개요

○ 위    치 : 지하차도(서신, 송천, 안덕원, 월드컵로, 대학로, 남고) , 터널(진북, 어은)

○ 사업내용 : 조도불량램프 교체, 등기구 먼지제거, 누전보수 등

○ 사 업 량 : L= 2,050m (8개소, 3,068등)

○ 사업기간 : 2007. 2～12월(년중 단가계약 시행)

○ 사 업 비 : 100백만원

□ 추진상황

○ 정비지역 : 지하차도(4개소), 터널(2개소)

○ 정비실적 : 조도불량램프 305등 교체 및  먼지제거, 누전보수

- 지하차도 : 안덕원(48등),월드컵(104등), 송천(81등),남고(12등)

- 터   널 : 진북터널(33등), 어은터널(27등)

□ 금후계획

○ 민원발생지역 및 교통사고 잦은 노선 순으로 지속 추진

※ 지하차도 및 터널 조명은 년중 24시간 상시 점등되어야 하므로           교통사고 예방을 위하여 주기적으로 조도불량램프 교체

전주천 교량 야간경관 조명 설치

○ 자연형 하천과 어우러진 아름다운 도시야경을 조성하여

천년전주 전통문화도시 이미지 부각

○ 다양한 칼라조명에 의한 아름다운 빛을 연출하여 관광객과

시민에게 볼거리 제공

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주천 백제교(2006.11.정책조정회의에서 선정)

○ 사업내용 : 교량 조형물 및 야간 경관조명 설치

○ 사업기간 : 2007. 2 ～ 2008. 1

○ 총사업비 : 500백만원(국비300, 시비 추경200)

※ 실시설계 용역비 : 12백만원

□ 추진상황

○ 백제교 야간경관 실시설계용역 착수 및 추진 ----- 2007. 2～5

○ 시 정책조정회의 안건 토론 및 용역(안) 확정 ---- 2007. 5.31

○ 야간경관조명 설치사업 추경예산(2억) 확보 ------ 2007. 6.

○ 시 아트폴리스 디자인 자문 및 보완(1~5차) ----- 2007. 6~9

○ 실시설계 완료 및 공사발주 ---------------------- 2007. 10.31

□ 금후계획

○ 백제교 난간 교체 및 전선배관 ----------------- 2007.11~12

○ 준                        공 ---------------- 2008. 1

주요도로 가로등 조도개선

팔달로, 충경로, 기린로등 구도심 주요도로 가로등의 조도를    개선하여 구도심 활성화 및 시민의 야간통행 불편해소

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 주요도로 가로등 조도개선사업

○ 위    치 : 팔달로 (풍남문사거리~신한은행)

○ 사업내용 : 기존 가로등을 철거하고 신규 설치

○ 사 업 량 : 가로등 50개소 교체(L= 1,500m)

○ 사업기간 : 2007. 11 ～ 2008. 1(3개월)

○ 사 업 비 : 300백만원

□ 추진상황

○ 하반기 팔달로 가로등 도로굴착 심의 ----------  2007. 6~7

○ 가로등 조도개선 설계 및 가로등 디자인 자문 --  2007. 8~9

○ Art-Polis 가로등 디자인 자문 완료 ----------- 2007.10.4

○ 팔달로 가로등 조도개선사업 공사발주 ----------  2007.10.31

□ 금후계획

○ 가로등 전선배관  -------------------------- 2007. 11

○ 준           공  -------------------------- 2007. 12

재난안전관리과 소관

ꊱ	삼천 자연형하천 조성사업 --------------	52
ꊲ	만경강 생태하천 가꾸기 사업 -----------	53
ꊳ	만경강 수계치수 중복천 개수공사 --------	54
ꊴ	아중천 생태하천조성 및 준설사업 --------	55
ꊵ	맑은 물이 흐르는 건산천 가꾸기 ---------	56
ꊶ	전주천 물길복원 및 수질오염 방지사업 --	57
ꊷ	재난 취약계층에 대한 안전복지서비스 강화 --	58

삼천 자연형하천 조성사업

○ 서부지역의 급속한 도시발전으로 삼천 이용객의 급증

○ 수질개선과 생태계 복원 및 각종 편익시설 확대 설치 필요

□ 사업개요

○ 위    치 : 삼천동 삼천교 ～ 팔복동 추천대교

○ 사업규모 : L = 8.05km

○ 총사업비 : 12,441백만원(국비 7,553, 시비 4,888)

○ 사업기간 : 2001 ～ 2007(7개년)

□ 추진상황(전체공정 95%)

○ 기본 및 실시설계 완료 ------------------ 2001. 10. 15

○ 공 사 착 공 ---------------------------- 2001. 12. 31

- 자연형 호안 4.1km, 차집관거 1.4km, 자전거도로 9.7km

- 수질 정화습지 1, 다목적 행사광장 1, 징검다리 4개소

- 체육시설 19개소, 진입개단 5개소, 진출입로 18개소 등

※ 투자액(100%) : 1,783백만원(2006년 계속사업비)

□ 금후계획

○ 수질 정화습지 1개소, 징검다리 2개소 ------- 2007. 12

○ 기타 부대시설 등 사업완공 ----------------- 2007. 12

만경강 생태하천 가꾸기 사업

○ 오염된 전주천 하류의 수질개선 및 하천생태계를 복원

○ 전주천, 삼천과 더불어 시민에게 쾌적한 휴식공간을 제공

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 팔복동 추천대교 ～ 만경강 합류부

○ 사업규모 : L= 7.9km(전주천 5.7km, 만경강 2.2km)

○ 총사업비 : 16,637백만원(국 10,772, 도 598, 시 5,267)

○ 사업기간 : 2001 ～ 2010(10개년)

□ 추진상황(전체공정 41%)

○ 기본계획 연구 및 기본설계 --------------- 2001.  4. 24

○ 하천개수 사업 완료(1.9km) ------------- 2003. 12. 31

○ 만경강 생태하천 가꾸기 사업 총괄계약 착공 - 2004. 11. 25

○ 1차~3차분(완료) ------------------------ 2006. 12. 14

- 조경석쌓기 3.2km, 산책로겸 자전거도로 10.89km ,수제설치 13개소

휴게소 3, 운동시설 5, 건널목교 5개소 등

○ 4차분 착수 ------------------------------- 2007. 5. 18

※ 투자액(42%) : 7,026백만원(기투자 5,163, 2007년 1,863)

□ 금후계획

○ 공 사 추 진 ------------------------------ 2007. 12

- 식생대 조성 27,923㎡, 수제 2개소 등

○ 전체사업 준공 ---------------------------- 2010. 12

만경강 수계치수 중복천 개수공사

○ 익산지방국토관리청 만경강수계치수 사업으로 선정 위ㆍ수탁 추진

○ 재해 예방과 친환경적인 생태하천으로 조성 시민휴식공간 제공

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 삼천동 쑥고개길 ～ 효자동 삼천 합류점

○ 사업규모 : 용지매입 및 하천개수 L=3.5㎞

○ 총사업비 : 32,000백만원(국비)

○ 사업기간 : 2004 ～ 2010(7개년)

□ 추진상황(전체공정 19%)

○ 위․수탁공사 협약 체결(익산청⇔전주시) --- 2003. 6. 9

○ 하천정비 시행계획 고시 ------------------- 2005. 8. 2

○ 토지 및 지장물 보상 협의 착수 ------------ 2005. 8.20

○ 공사 총괄계약 및 1차분 공사 착공 --------- 2005.10.21

○ 1차분 공사 준공 -------------------------- 2006.10.30

- 축대 및 호안설치 345m, 수로이설 153m

○ 2차분 공사 착공 및 토지보상 추진 --------- 2007. 4 ～

※ 투자액(21%) : 7,343백만원(기투자 3,203, 2007년 4,140)

- 교량 1개소, 호안축제 800m, 토지 및 지장물 보상 56건/13억원

□ 금후계획

○ 2차분 공사준공 추진 ---------------------- 2007. 12

- 호안 및 축제 500m, 토지 및 지장물 보상 1식

○ 전체사업 준공 ---------------------------- 2010. 12

아중천 생태하천조성 및 준설사업

○ 도심하천인 아중천에 대하여 수질개선 및 하천정비 시행

○ 재해사전 예방 및 하천생태 환경을 복원하여 시민휴식공간 제공

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 우아동 아중리 복개종점 ～ 소양천 합류부

○ 사업규모 : L= 2.88㎞

○ 총사업비 : 4,400백만원(국 2,600, 도 900, 시 900)

○ 사업기간 : 2004 ～ 2008(5개년)

□ 추진상황(전체공정 45%)

○ 설계심의 등 행정절차 완료 ------------------- 2006. 7. 7

○ 총괄공사 계약 및 1차분공사 착공 ------------- 2006. 9. 7

- 1차분 : 교량 1개소(우정신세계앞), 저수호안공 1,975m

○ 2차분 공사착공 ------------------------------ 2007. 4. 2

※ 투자액(52%) : 2,330백만원(기투자 1,330, 2007년 1,000)

- 인도교 1개소, 취수보(어도 포함) 1개소

□ 금후계획

○ 공 사 추 진 ---------------------------------- 2007. 12

- 산책로 개설, 인도교 1개소 시공

○  전체사업 완공 ------------------------------ 2008. 12

맑은 물이 흐르는 건산천 가꾸기

건산천을 맑은 물이 흐르는 하천으로, 지역 주민과 함께 조성하여

전주시 관문을 아름답게 가꾸고자 함

□ 사업개요

○ 위    치 : 금암동 시외버스터미널 ~ 전주천 합류점

○ 사업규모 : 미복개구간  L= 875m

○ 사 업 비 : 용역비 150백만원

○ 사업기간 : 2007 ～ 2009(3개년)

□ 추진상황

○ 전주시 용역과제심의위원회 심의 ---------- 2006. 10

○ 건산천 가꾸기 사업 기본방향설정 --------- 2006. 12

○ 기본계획 및 실시설계 착공 --------------- 2007. 6. 22

- 하천측량, 하천정비 기본계획 데이터 수집, 환경성 검토 등

□ 금후계획

○ 기본계획 및 실시설계 추진 ----------------- 2008. 5

전주천 물길복원 및 수질오염 방지사업

○ 기능을 상실한 보 철거를 통한 생태통로의 복원(옛 물길 찾기)

○ 보 상류 하상구조상 초기 우수유입 퇴적으로 오염, 악취 발생 예방

○ 매년 봄철(4~5월) 부영양화 등 물고기 폐사사고 방지

□ 개    요

○ 위    치 : 덕진구 덕진동 명성 강변아파트 앞

○ 규    모 : 보 높이 3.1m  길이 88.4m

○ 사 업 비 : 900백만원(국비 630, 시비 270)

○ 사업기간 : 2007 ~ 2008(2개년)

□ 추진상항

○ 하가지구 택지개발로 용도 폐지되는 덕진보개량 용역 추진 - 2006. 01

○ 상∙하류의 생물조사, 물리,화학,생태적 하천조사 - 2006. 04

○ 철거 및 개량에 따른 하상변동 예측 모의실험 결과보고 - 2006. 11

○ 철거 및 개량에 다른 전문가 자문회의 개최 ------ 2006. 11

○ 실시설계 용역 완료 --------------------------- 2007. 02

○ 2007년도 하반기 자연형 하천정화사업 반영(환경부) - 2007. 06. 14

○ 공사착공 ----------------------------------- 2007.09.03

- 보철거 완료, 호안석 쌓기 시공중

□ 금후계획

○ 공 사 완 료 -------------------------------- 2007.  12

재난 취약계층에 대한 안전복지 서비스 강화

○ 국민기초 생활보장 수급자 대부분이 당장 생계유지에 급급      하여 생활안전 문제에 소홀

○ 시민의 생명과 재산을 보호하는 안전도시 구축

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 재난취약계층에 대한 안전복지 서비스 실시

○ 사 업 비 : 20백만원

○ 사업기간 : 2007. 2 ～ 2007.  5

○ 사 업 량 : 2,000 세대

○ 사업내용 : 가정용 소화기 (하론가스) 지급

□ 추진상황

○ 지원대상 세대 조사실시 --------------------- 2006. 12

○ 소화기(하론가스) 구입 ---------------------- 2007. 5. 3

○ 소화기(하론가스) 지급 완료(19,700천원) - 2007. 5. 29～6. 5

하수관리과 소관

ꊱ	하수처리장 기존 1,2단계 고도처리사업 -----	60
ꊲ	하수관거정비 민간투자(BTL)사업 ---------	61
ꊳ	화산․덕진처리구역 하수관거 정비사업 -----	62
ꊴ	동서학동(원당․객사) 차집관거 설치사업 ----	63
ꊵ	산정동 침수지역 하수관거 공사 ------------	64
ꊶ	배미실 우수암거 설치공사 -----------------	65
ꊷ	하수슬러지 처리시설 설치사업 -------------	66
ꊸ	노송천 복원 프로젝트 --------------------	67
ꊹ	하수처리 편입구역 하수관거 정비공사 ------	68
	하수처리장 홍보관 설치 ------------------	69
	하수처리장 민간위탁관리 -----------------	70

하수처리장 기존1,2단계 고도처리사업

	추 진 배 경
○ 하수도법 개정으로 강화된 수질기준에 맞게 기존시설 개량 ○ 하수처리장 시설개선으로 만경강등 새만금유역 수질개선 도모

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 송천동2가 1035번지 환경사업소내

○ 사업규모 : 303천톤/일, 고도처리공법개선(표준활성법 → CNR공법)

○ 사 업 비 : 60,000백만원(국비 30,000, 지방비 30,000)

○ 사업기간 : 2002. 3 ～ 2007.11

□ 추진상황(전체공정 99%)

○ 고도처리공사 착공 ---------------------------- 2004.10

○ 구조물 및 수처리공정 완료 -------------------- 2006.10

○ 수처리시설 종합시운전 개시 ------------------- 2006.10

- 성능시험운전 완료 (2006.10.15～2007. 6.30)

- 신뢰성운전 완료   (2007. 8. 8～2007.10. 8)

○ 예비준공검사 완료 ---------------------------- 2007.10

□ 금후계획

○ 사업 마무리 및 준공 ------------------------- 2007. 11

○ 사업 완료보고(전북도, 환경부) ---------------- 2007. 12

하수관거정비 민간투자(BTL)사업

	추 진 배 경
○ 민간자본 유치로 지역경기를 활성화 하고 정화조 폐쇄로 시민부담 경감 ○ 오수관거 정비로 하천 수질개선 및 불명수를 차단 하수처리비 절감

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 일원(덕진, 아중, 중앙, 화산, 효자 처리구)

○ 사 업 량 : 하수관거 정비(우․오수 분리) L=127Km

○ 사업기간 : 2005 ～ 2010 (6개년)

○ 사 업 비 : 107,361백만원(민간자본)

□ 추진상황(전체공정 9.0%)

○ 업무 위․수탁 협약체결(환경부, 도, 시, 환경관리공단) ------ 2005.06

○ 시설사업 기본계획고시(민투법 제8조, 10조) ----- 2005.06

○ 시의회 의무부담행위 동의안 의결 ---------------- 2005.09

○ 민간사업자 사업계획서 평가 및 우선협상대상자 선정 ------ 2005.10

○ 협상 및 사업시행자 지정(전주아랫물길(주)) ------ 2006.04

○ 우선시공분 시설사업 실시계획 승인 및 착공 --------- 2006.04

○ 전체분 시설사업 실시계획 승인 및 착공 ---------- 2007.04

- 전체 L=127㎞중 14.3㎞ 완료

□ 금후계획

○ 공사 준공 ------------------------------------- 2010.04

○ 성과보증(13개월)  ---------------------------- 2011.05

○ 사업시행자 관리운영(20년간)   ----------------- 2031.05

화산․덕진처리구역 하수관거 정비사업

	추 진 배 경
○ 하수관거 우․오수 분리를 통하여 민간위탁중인 하수처리비 절감 ○ 전주천, 삼천 수질개선과 건물 정화조 폐쇄로 시민 보건위생 향상

□ 사업개요

○ 위    치 : 화산처리구역 1․4․7분구, 덕진처리구역 1분구

○ 사업규모 : 하수관거정비(우․오수분리) L=70㎞

○ 사업기간 : 2004 ～ 2008 (5개년)

○ 사 업 비 : 39,728백만원(국비 19,583, 시비 20,145)

□ 추진상황(전체공정 80%)

○ 1,2,3차분(동서학동,덕진동,금암동) L=34.2Km완료 ------- 2006.12

○ 4차분(효자택지, 서신2택지) 착공 ---------------- 2006.05

- 계획연장 L=23.1Km 중 22Km 완료

○ 5차분(호반촌, 인후동 6지구) 착공 --------------- 2007.04

- 계획연장 L=7.4Km 중 5.2Km 완료

□ 금후계획

○ 4․5차분 공사완료 ------------------------------ 2007.12

○ 잔여분(L=5.3Km) 착수 ------------------------- 2008.03

○ 사업 준공 --------------------------------------- 2008.12

동서학동(원당․객사) 차집관거 설치사업

	추 진 배 경
○ 상류 농촌동 지역 발생 오수를 관거설치 차집처리 전주천 수질개선 ○ 정화조 폐쇄, 차집관거에 직접연결 시민 보건위생 향상

□ 사업개요

○ 위    치 : 농촌동 3개마을(동서학동 내․외원당, 객사)

○ 사업규모 : 하수관거 정비 L=7.8㎞

○ 사업기간 : 2004 ～ 2007 (4개년)

○ 사 업 비 : 3,364백만원(국 1,682,  도 841,  시 841)

□ 추진상황(전체공정 85%)

○ 사업계획 확정 통보(환경부) ---------------------- 2004.12

○ 기본계획 및 실시설계 용역완료 ------------------- 2005.09

○ 1․2차분(동서학동 객사마을) L=2.2km완료 -------- 2006.12

○ 3차분(동서학동 내․외원당마을)착공 ------------- 2007.04

- 계획연장 L=5.6m 중 5.0Km 완료

□ 금후계획

○ 전체 사업 준공 ------------------------------- 2007.12

산정동 침수지역 하수관거 공사

	추 진 배 경
○ 산정동 안덕원 지하차도 주변 집중호우시 주택침수 피해발생 ○ 하수관거 사업으로 피해예방 및 쾌적한 지역생활 환경조성

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 산정동 우정신세계부근

○ 사 업 량 : 우수관거 신설 L=232m

○ 사업기간 : 2007. 8 ～ 2007. 12

○ 사 업 비 : 231백만원

□ 추진상황 (공정 50%)

○ 실시설계 용역 완료 ------------------------------ 2007.06

○ 공사 착공 ------------------------------------- 2007.08

- 우수관거 신설 L=232m 중 L=150m 완료

□ 금후계획

○ 공사완료 -------------------------------------- 2007.12

배미실 우수암거 설치공사

	추 진 배 경
○ 호성동 배미실 주변 집중호우시 농경지 침수 피해발생 ○ 우수암거 사업으로 피해예방 및 쾌적한 지역생활 환경조성

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 호성동 배미실부근

○ 사 업 량 : 우수관거 L=617m, 오수관거 L=834m

○ 사업기간 : 2007. 10 ～ 2008. 4 (2개년)

○ 사 업 비 : 831백만원(시비)

□ 추진상황 (공정 10%)

○ 실시설계 용역 완료 ------------------------------ 2007.06

○ 공사 착공 ------------------------------------- 2007.10

□ 금후계획

○ 공사완료 -------------------------------------- 2008.04

하수슬러지 처리시설 설치사업

	추 진 배 경
○ 2012년부터 해양투기 전면 금지에 따른 대책 마련 필요 ○ 슬러지의 안정적 처리시설 확충으로 자연환경 보전에 이바지

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 송천동2가 환경사업소내(미정)

○ 사업규모 : 슬러지 처리시설 150톤/일

○ 사업기간 : 2006 ～ 2010(5개년)

○ 사 업 비 : 24,000백만원(국비 12,000, 지방비 12,000)

□ 추진상황

○ 기본 및 실시설계 용역 착수 ----------------- 2003.08

○ 용역 중지(공정율81%) ---------------------- 2004.12

○ 처리방식 결정을 위해 국내․외 시설견학 ------ 2006.11~

○ 공법설명회를 개최(전문가 9인) -------------- 2007.04

○ 시의회(도시건설위원 3인) 국내시설 견학 ----- 2007.05

○ 슬러지 적정처리방안 토론회 개최 ------------ 2007.08

○ 슬러지 처리대책위원회 구성 및 1차 회의 개최 --- 2007.10

○ 슬러지 처리대책위원회 2차 회의 개최 ------- 2007.11

□ 금후계획

○ 시설 입지결정 및 지역주민 협의진행 --------- 2007.12~

○ 사업발주 ----------------------------------- 2008하반기

○ 처리시설 시운전 및 사업 완료 ---------------- 2010.12

노송천 복원 프로젝트

	추 진 배 경
○ 하수도화된 노송천 복개구간 자연형하천으로 복원 환경개선 ○ 도심속의 수변공간 제공 및 침체된 구도심 활성화 도모

□ 사업개요

○ 위    치 : 시청앞 노송광장 ～ 한국은행

○ 사 업 량 : 하천복원 L=1.1Km, B=15～25m

○ 사 업 비 : 37,500백만원(국비 25,100,  시비 12,400)

○ 사업기간 : 2007 ～ 2010(4개년)

□ 추진상황

○ 정책토론 및 간담회 개최 ----------------------- 2007.01

○ 노송천복원 민․관협의회 구성 및 운영(4회) ---- 2007.04～

○ 기본(종합)계획 및 실시설계용역 착수 ---------- 2007.04

○ 주민설명회개최(진북, 중앙,노송,우아2동) ----- 2007.08

□ 금후계획

○ 아트폴리스 자문 ------------------------------ 2007.11

○ 노송천복원 민․관협의회 개최 ---------------- 2007.11

○ 설계자문 심의 및 공사사전심사 완료 ----------- 2007.11

○ 기본계획 및 설계서 검토(환경부) -------------- 2007.11

○ 실시설계용역 완료 ---------------------------- 2007.12

○ 공사착공 및 완료 ------------------- 2008.02～2010.12

하수처리 편입구역 하수관거 정비공사

	추 진 배 경
○ 도심하천 상류지역의 생활오수를 차집하여 하수처리장에 유입 ○ 공공수역 수질오염 방지로 도심속의 쾌적한 수변공간 제공 ○ 농촌동 마을하수도 개량으로 보건위생 증진

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 평화동 장교마을등 54개마을

○ 사 업 량 : 하수관거 설치 L=51.6Km

○ 사업기간 : 2007 ～ 2010(4개년)

○ 사 업 비 : 32,100백만원(국비 16,050,  시비 16,050)

□ 추진상황

○ 하수도정비기본계획변경용역 전문가 간담회 ------ 2006.09

- 농촌동 생활오수 하수처리장에 직접연결 제시

○ 기본 및 실시설계 용역 착수 -------------------- 2007.06

○ 하수도정비기본계획 변경 승인(환경부) --------- 2007.07

□ 금후계획

○ 재정 및 사용에 관한 협의(전주지방환경청) ------ 2007.11

○ 설계자문심의 및 공사사전심사 완료 ------------- 2007.11

○ 기본 및 실시설계 용역 완료 --------------------- 2007.12

○ 공사 착공 및 완료 ------------------- 2008.03～2010.12

하수처리장 홍보관 설치

	추 진 배 경
하수처리장이 혐오 시설이라는 인식에서 탈피하고 환경보전에 대한 중요성을 일깨우는 체험교육장 및 홍보 공간으로 활용함으로써 행정의 신뢰감을 갖는 장소로 적극 활용

□ 사업개요(추진방향)

○ 위    치 : 덕진구 송천동 환경사업소 관리동 내

○ 사업규모 : 전시홀(로비,복도) 및 시청각실 452㎡

○ 사업기간 : 2007. 2 ~ 2008. 1

○ 사 업 비 : 533백만원

□ 그간 추진상황

○ 타 지역 홍보시설 자료수집(사천하수처리장 홍보실외 7개소)

○ 설계용역 완료(‘07.9월), 공사착공(’07.10.1일)

○ 전주 하수종말처리장 견학 및 방문자 현황

구 분	2005년		2006년		2007년(예상)		비고
	학생	일반	학생	일반	학생	일반	고도처리공사 완료 후 증가예상
방문자수	400	200	300	1,200	600	1,000

※ 고도처리공사 및 홍보관 완료후 학생들의 환경 체험공간으로 활용

□ 금후계획

○ 공사완료 및 일반인 개방 ------------------------ 2008. 01

하수처리장 민간위탁 관리

	추 진 배 경
○ 민간기업의 전문기술 도입으로 하수처리장 효율적 운영 ○ 인건비등 운영비용의 절감으로 시 재정부담 경감

□ 사업개요

○ 위탁업체 : 전주개발(주)

○ 규    모 : 하수 403천톤/일, 위생 290㎘/일

○ 기    간 : 2004. 12. 1 ～ 2024. 11. 30(20년간)

○ 수질기준                                     (단위㎎/ℓ)

항목 구분	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균	비 고
1․2단계	10	40	20	20	2.0	3000	법적수질기준
3단계	10	20	10	20	2.0	2000	환경영향평가 협의수질기준

□ 추진상황

○ 제1단계(103천톤/일) 처리장 준공 ------------- 1990.03

○ 제2단계(200천톤/일) 처리장 준공 ------------- 1997.12

○ 제3단계(100천톤/일) 증설공사 및 실시협약 체결 -------- 2002.02

○ 하수처리장 3단계 증설 민간투자사업 변경협약 -------- 2004.09

○ 3단계 처리장 준공 및 민간위탁 운영 개시 -------- 2004.12

○ 하수처리장 3단계 증설 민간투자사업 변경(2차)협약 ------ 2007.10

□ 금후계획

○ 수탁업체 지도/감독 강화로 민간위탁 운영 효율성 제고

차량등록사업소 소관

ꊱ	자동차 정기 무상점검 서비스 실시 ------	72
ꊲ	민원폭주 해소를 위한 『집중투입제』 실시 ----	73
ꊳ	자동차와 함께 하는『드림팀』 운영 ------	74
ꊴ	자동차 번호판 제작소 행정 지도 --------	75

자동차 정기 무상점검 서비스 실시

○ 자동차 이전등록을 위해 차량등록사업소를 방문하는 차량에 무상

점검 서비스를 실시 자동차 안전운행 의식 고취

○ 매주 금요일에 실시하는 「자동차관련 상담 드림팀」운영 일정에

맞추어 ONE-STOP 행정 서비스 체제 구축 시민만족 행정 구현

□ 사업개요

○ 일시․회수 : 매월 셋째주 금요일

○ 실시기관 : 자동차 3사 정비업체(현대, 대우, 기아)

○ 실시장소 : 차량등록사업소 후정 주차장

○ 점검내용 : 무상점검, 간단한 소모품은 차주 소지 교체 지원 교육

□ 그간 추진실적

○ 자동차 3사 정비업체 협의 완료 ------------ 2007. 1. 15

○ 자동차무상점검 실시 ----------------------- 7회 182대

○ 자동차 고장 무료 상담 실시 ---------------- 121건

□ 금후계획

○ 자동차 3사 서비스 센터 협조 출장 점검반 지원 요청

○ 장소와 시간 효율적 운용을 위하여 오전․오후 점검회사 분리

○ 매월 셋째주 금요일 실시 계획 사전 홍보

민원폭주 해소를 위한『집중투입제』실시

○ 자동차 전국 번호판제 시행 및 전북 시․군 차량에 대하여 도내

이전등록이 가능하여 민원인 증가

○ 자동차 등록 민원이 해마다 증가추세에 있음

○ 대기시간 과다소요로 민원인들의 불만으로 민원발생 초래

□ 현    황

○ 일일 민원처리 평균 현황

구 분	계	신 규	이 전	변 경	말 소	압 류	저 당	기 타
월․금요일	4,488	77	268	672	85	1,987	115	1,284
평 일	3,538	51	214	332	55	1,776	92	1,018
증	950	26	54	340	30	211	23	266

○ 평일 20 ～30분 대기, 월․금요일에는 1～2시간 대기

□ 그간 추진실적

○ 전 직원 등록업무(신규․변경․이전) 교육 실시로 민원처리

시간 단축 ➩ 매주 수요일 18:00시 이후 교육 실시 : 40회

○ 등록업무 창구(신규․변경․이전)직원 유고시 대체 요원 배치

○ 등록업무 창구(자동차 매매상사 접수용)민원에 대해서 가능인원 집중 투입 처리

➩ 매주 월요일․금요일

○ 대기시간 과다소요로 민원 폭주시 민원처리 직원 추가 배치

□ 금후계획

○ 정례적인 전 직원 업무연찬 실시 : 매주 월요일

자동차와 함께하는『드림팀』운영

차량등록사업소를 찾는 고객을 위하여 자동차와 관련된 궁금증

해결 및 권리보호를 위하여『전문가 상담의 날』을 운영 시민이

대 만족 할 수 있도록 최고 양질의 서비스를 제공

□ 현    황

구 분	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일
민원처리건수	5,166	3,147	2,458	3,114	3,809

※ 요일별 평균 처리 3,538건/월요일 5,166건으로 68% 증가

□ 그간 추진실적

○ 상담장소 : 차량등록사업소 상담실

○ 상담일시 : 매주 금요일(10:00~17:30)

○ 상 담 원 : 5명(자동차 전문가 각 1 명)

- 교통안전진흥공단, 전주 자동차 검사소, 자동차보험사,

자동차 매매사업조합, 행정경험이 풍부한 전직 공무원

○ 상담실적 : 218건

□ 금후계획

○ 차량 유지 관리 및 보수 상담 실시

○ 사고 예방 및 보험 관련 상담 실시

○ 교통법규 상담 실시

○ 차량등록 관련 상담 실시

자동차 번호판 제작소 행정 지도

자동차 등록번호판 교부 대행 업무를 수행하는 번호판제작소의

운영을 시민이 신뢰하고 적정한 가격을 유지하도록 행정지도

□ 현    황

○ 업 소 수 : 전주번호판 제작소 외 6개소

○ 교부매수 : 23,429매/월(2007. 1. 2 ～2007. 9. 30일까지)

□ 그간 추진실적

○ 지도점검 및 민원조사 : 3회(2007. 3월, 2007. 5월, 2007. 7월)

○ 강력하고 지속적인 번호판 교부 수수료 인하

- 1999년도 자율결정 16,500원 ➩ 2006.11월 12,000원

○ 업소별 번호판 가격표 종류별 게첨

○ 소비자 요구할 경우 원가계산서 제시하도록 지도

○ 강력한 행정지도로 번호판 가격 인하 유도 및 인상 억제

○ 지방자치단체에서 번호판가격 상한금액을 정할 수 있도록

자동차관리법 개정 요청(2006. 10월)

○ 차량등록사업소 업무종료 후 30분후에 업무종료 하도록 행정지도

□ 금후계획

○ 자동차 번호판 제작업소 지도점검 실시 : 12월중

○ 공무 대행인 점을 인식하고 서비스에 최선을 다하도록 지도

○ 자동차 번호판 가격이 타 자치단체와 형평성 유지토록 행정지도