제256회 전주시의회 제1차정례회

도  시  건  설  위  원  회

2008년도

주요업무 추진상황 보고

상하수도 사업소

보 고 순 서

□  일  반  현  황        ------------------          1

□  부서별 주요기능         -------------           2

□  기  본  현  황               --------------      3 ~ 7

□  2008년도 부서별 주요업무 추진상황 --          8

○  수도행정과 소관      ------------     9~12

○  급 수 과   소관     -------------    13~20

○  수질관리과 소관      ------------     21~25

○  하 수 과   소관      ------------    26~33

일 반 현 황

□ 기구 및 인력

○ 기  구   -   4과 13담당(1전산실,1실험소,1센타,17사업장)

																																																								상하수도 사업소
			수도행정과																																					급 수 과																																		수질관리과																				하 수 과
	수도행정							요금							체납징수																						유수율제고										급수시설											누수방지						계량기관리											수질관리					수질분석						생산관리								하수행정			하 수 시설			하수정비
	전산실							누수방지센타						계량기시험소								방수리취수장			삼천취수장								원당취수장				전미취수장									상관수원지																								인후배수지		천마배수지			효자배수지			완산배수지		송천배수지				서신배수지					금암배수지			화산배수지				대성정수장	지곡정수장		상관정수장	팔복정수장

○ 인   력

부서 직급		정원	현 원
			계	수도행정과	급 수 과	수질관리과	하 수 과
합계		98	93	22	27	32	12
일반직	소계	57	56	12	16	16	12
	4급	1	1	1
	5급	4	4	1	1	1	1
	6급	13	13	3	4	3	3
	7급	23	31	7	6	11	7
	8~9급	16	7	-	5	1	1
연 구 사		3	3	-	-	3	-
기 능 직		38	34	10	11	13	-

※ 청경 16명,  상용직 14명,  상용나급 10명

부서별 주요기능

과 별	주 요 업 무	비 고
수도행정과	• 상수도사업 경영혁신 및 경영평가 • 지방채 및 자치법규 제․개정 • 계약 및 물품관리 • 상수도사용료 부과징수 업무 • 검침업무 위탁관리, 실사 이의신청 처리 • 세입현계, 과오납, 자동납부신청, 환불, 누수감액 • 공기업특별회계 금고계약 및 관리
급 수 과	• 유수율제고 중장기 계획 • 급수공사 신청서 접수 및 승인 • 노후급수관 교체 및 통합공사 • 맑은 물 공급사업 • 배수관 및 급수관 시설공사 • 블록시스템 구축사업 • 누수탐사 및 누수복구 • 누수신고센타 운영관리 및 누수복구작업 • 마을 상수도 유지관리 • 수전관리, 수도계량기 교체 • 계량기 실태조사 및 관리
수질관리과	• 생활용수 수요에 따른 정․원수 확보 • 광역상수도 수급에 관한 업무 전반 • 취․정수장 배수지 등 사업장 시설 유지관리 • 먹는 물 공동시설(지정약수터) 수질검사 • 사업장 시설물 유지관리 • 국가공인 수질검사기관 운영관리 • 공업용수 수급 및 유지보수
하 수 과	• 하수도공기업특별회계 세입 세출예산 및 결산 • 하수도사용료 조정 및 징수관리 • 금강수계관리기금 업무 • 화산․덕진처리구역 하수관거 정비사업 • 하수관거정비 민간투자(BTL)사업 • 마을하수도 유지관리 • 하수처리장 운영관리 및 시설물 유지관리

기 본 현 황

□ 급수 인구

총인구	급수인구	보급율 (%)	1일 1인 급수량(ℓ)	급수전	유수율(%)	무수율(%)	비고
명 627,339	명 621,935	99.1	403	197,214	61.3	38.7

□ 수계별 생산 및 급수구역

구 분			시설용량 (천㎥/일)	급수량 (천㎥/일)	급 수 지 역	급수인구	비율 (%)
총 계			328	293		621,935	100
생활용수	합 계		258	251	33개동	621,935	100
	자체상수도	대 성	40	40	동․서서학, 중화산1, 완산, 효자1일부, 삼천1일부, 평화1.2일부	99,011	15.9
	광역상수도	전주권	218	211	중앙,풍남,노송, 서신, 삼천1일부. 2. 3, 중화2, 평화1.2일부, 효자1일부.2. 3. 4, 진북, 인후1.2.3, 금암1.2, 덕진, 우아1.2, 호성, 팔복, 송천1.2, 조촌, 동산.	522,924	84.1
공업 용수	팔복정수장		70	42	팔복동 1, 2공단		18개 업체공급

※ 생활용수 급수구역은 생산량 및 수요량에 따라 조절

□ 도․송․배․급수관

단위 : ㎞

총 연 장	도 ․ 송 수 관	배 수 관	급 수 관	비 고
2,136	57	684	1,395

□ 상수원 보호구역

상수도사업장	보 호 구 역			구역지정일	보호시설
	면적(㎢)	상류(Km)	하류(Km)		안내판	표주
계	26.96				42	132
방수리취수장	0.27	1.0	0.5	72. 5. 5.	7	24
상관수원지	25.99 (마치12.00 의암13.99)	전유역		24. 6. 9.	10	26
삼천취수장	0.28	2.2 (독배천0.7)	0.3	82. 6.19.	11	42
원당양수장	0.10	1.0	0.1	80. 8. 4.	6	16
전미취수장	0.32	0.5	0.3	67. 8. 5.	8	24

□ 상수원 수계별 『댐』 저수량

수 원	위 치	만수량(천㎥)	관리기관	비 고
계		817,139
상 관 제	완 주 군	2,139	전 주 시	대성수계보충
용 담 댐	진 안 군	815,000	수자원공사	전주권광역

하수도 기본현황

□ 하수도

구 분		처리구역 (㎢)	계획연장 (㎞)	시설연장 (㎞)	미시설연장 (㎞)	보급율 (%)	비고
계		54.97	1,826	1,392	434	76.2
합 류 식			0	621	0	100.0
분류식	소 계	54.97	1,826	771	1,055	42.2
	오수관거	-	912	443	459	49.1
	우수관거	-	924	328	596	25.5

□ 차집관로

하 천 명	연 장 (㎞)	맨 홀 (개)	우수토실 (개소)	환기구 (개소)	여수토실 (개소)
계 (6개노선)	88.9	1,010	251	73	5
전주천 (좌, 우안)	23.5	369	142	37	4
삼 천 (좌, 우안)	15.4	155	45	18
금암천 (좌, 우안)	4.4	82	38	9
아 중 선	12.0	174	16	4
팔복선(공장,생활)	16.9	183	8	5	1
상 관 라 인	10.4	47	2
기 타	6.3

□ 하수․위생처리 시설

구 분	하 수 처 리	위 생 처 리
위 치	덕진구 송천동 2가 1130번지
시설용량	1일 처리능력 ⇨ 403,000㎥ - 1단계 시설 : 113,000㎥ - 2단계 시설 : 190,000㎥ - 3단계 시설 : 100,000㎥	1일 처리능력 ⇨ 290㎘ - 분 뇨 : 30㎘ - 정 화 조 : 260㎘
처리방법	1․2단계 고도처리(CNR)공법 3단계 고도처리(CSBR) 공법	하수 연계처리 (1994년부터 시행)

2008년 상수도 공기업 예산

총 규 모 : 70,085백만원

(단위 : 백만원)

세 입			세 출
계 : 70,085(100%)			계 : 70,085(100%)
○ 상수도사업수익 : 54,983(78.5%)			○ 상수도사업비용 : 46,987(67.0%)
◦ 영업수익 : ․ 급 수 수 익 : ․ 급수공사수익 : ․ 기타영업수익 : ◦ 영업외수익 : ․ 예금수입이자 : ․ 타회계전입금 : ․ 기타영업외수익 :	53,704 50,676 2,602 426 1,279 532 580 167		◦ 인 건 비 : ◦ 물 건 비 : ◦ 이전경비 : ◦ 급수공사비 : ◦ 지급이자 : ◦ 예 비 비 :	6,015 35,181 1,567 1,423 2,301 500
○ 자 본 적 수 익 : 10,650(15.2%)			○ 자본비용 : 23,098(33.0%)
◦ 고정부채수입 :	10,000		◦ 자본투자비 :	18,439
◦ 자본잉여금수익 :	650		◦ 부채상환금 :	4,359
○ 예 산 외 계 정 : 4,452(6.3%) (과년도계정)			◦ 예 비 비 :	300

2008년 하수도 공기업 예산

총 규 모 : 29,925백만원

(단위 : 백만원)

세 입			세 출
계 : 29,925(100%)			계 : 29,925(100%)
○ 하수도사업수익 : 16,551(55.3%)			○ 하수도사업비용 : 11,465(38.3%)
◇ 영 업 수 익 : 14,363(48%)			◇ 영 업 비 용 : 11,000(36.7%)
			◦ 관 거 비 :	1,000
◦ 하수도사용료수익 : ◦ 기타영업수익 :	14,294 69
			◦ 운 영 경 비 :	40
◇ 영업외 수익 : 2,188(7.3%)
			◦ 일반관리비 :	9,960
			◇ 영업외 비용 : 330(1.1%)
◦ 수입이자 : ◦ 타회계전입금수익 :	400 1,788
			◇ 특별손실 : 35(0.1%)
			◇ 예 비 비 : 100(0.4%)
○ 자 본 적 수 익 : 8,751(29.2%)			○ 자본적지출 : 18,460(61.7%)
◦자본잉여금수익	8,751		◦ 가동설비자산 :	14,493
			◦ 비가동설비자산 :	1,835
․ 타회계건설보조금 :	3,051
			◦ 고정부채상환금 :	1,531
․ 공사부담금 :	5,700
			◦ 기타자본적지출 :	13
○ 예 산 외 계 정 : 4,623(15.5%) (과년도계정)
			◦ 예 비 비 :	588

2008년도 부서별 주요업무 추진상황

수도행정과  소관

급 수 과  소관

수질관리과  소관

하 수 과  소관

수도행정과  소관

「다양하고 더욱 편리해진」

맞춤형 상수도 요금서비스 이용 확대  ․․․․․․ 10~11

「건전재정 확충 실현을 위한」

상수도 체납사용료 징수율 제고  ․․․․․․․․․․․․․  12

「다양하고 더욱 편리해진」

맞춤형 상수도 요금서비스 이용 확대

○ 인터넷의 대중화로 상수도 행정 서비스에 대한 시민들의 욕구가

날로 증가하고 있어 다양하고 더욱 편리한 맞춤형 요금서비스를

실시간 제공함으로써 시민 편의 및 상수도 행정의 만족도 제고

□ 개  요

○ 그간 민원처리가 주로 전화 또는 방문 등 오프라인상에서만 가능하여   시민이 만족할 만한 서비스 제공에 한계가 있었으나,

○ 시민이 언제 어디서든지 온라인상(상하수도사업소 홈페이지 접속)에서

요금조회납부․이사정산․체납조회 등이 가능토록 시스템 구축 시행

□ 그동안 추진상황

○ 맞춤형 상수도 요금 홈서비스망 구축 시행  ---   2008. 2월

-「상수도 요금 ! 이제는 온라인상에서 다 해결해 줍니다」시민홍보 강화

․매월 고지서 표기 / 홍보안내문 194천매 제작 배부 : ‘08. 2월

- 맞춤형 상수도 요금 홈서비스망 접속 이용 : 7,980건/월

- 납부방법의 다양화 및 이용 증대

․인터넷 납부 증대 : 4,900건(‘07) → 7,720(’08)

․자동납부 및 가상계좌 이용 증대    ----    ’07년 대비 3배 증

○ 유선 및 방문민원 25% 감소로 더욱 상세하고 친절한 서비스 제공

- 400건/일(‘07년)  ⇒  302건/일(’08 상반기)

□ 금후계획

○ 상수도 요금 인터넷 서비스 실시 지속 홍보를 통한 이용 증대 추진

○ 인터넷 서비스 프로그램 보완 추진 : 수용가 설문 및 간담회 개최 등

○ 더욱 편리하고 다양한 납부제 시행을 위한 타지자체 벤치마킹 추진

맞춤형 상수도 요금서비스 이용확대 시행(안)

■ 개편 전 홈페이지 “견본”

■ 개편 후 홈페이지 “견본”

「건전재정 확충 실현을 위한」

상수도 체납사용료 징수율 제고

□ 현  황

ꡑ08.6.30 현재                              (단위 : 천건, 백만원)

구분	조 정 액		징 수 액		체 납 액		징수율 (%)	비고
	건수	금 액	건수	금 액	건수	금 액
계	1,132	23,644	969	20,829	163	2,815	88.1
현년도	972	21,017	916	19,842	56	1,175	94.4
과년도	160	2,627	53	987	107	1,640	37.6

※ ’07.12 과년도 체납액 : 2,627백만원 ⇒ 987백만원 징수(37%)

□ 그동안 추진상황

○ 특별징수기간 운영 : 2회

○ 상수도요금 체납액 징수 및 독려

- 계고장 교부  ⇒  3,306건 327백만원

-  고액체납 건물주에게 납부안내문 발송 : 2,108건  1,184백만원

(건물주 확인 : 완산 1,142, 덕진 966)

○ 고액체납 수용가 행정조치

- 급수중지(단수) : 42개소 (93,416천원)

- 개전:32개소(61,340천원)/미개전:10개소(32,076천원)

□ 문제점

○ 고액체납자 다수민원 예상으로 행정조치(단수) 지연

○ 여름철 단수조치에 따른 수용가 반발 예상

○ 다량건수 체납자 장기폐문으로 징수(단수등) 어려움

□ 금후 추진계획

○  5건이상(15만원이상) 체납액 독려부 작성 특별관리

○  단수처분 후 미개전수용가 특별관리(도수 및 훼손방지)

○ 고액(다량건수) 체납자 방문독려

- 행정절차 이행후 단수조치 우선(분납징수, 재산압류 등)

급 수 과  소관

유수율 제고를 위한 블록시스템 구축사업   ․․․․․․․․․․  14

상수도 100% 확대 공급사업   ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․    15

대형 계량기실 확장 및 배관구조 개선사업 ․․․․․․․․․․․․ 16

체계적이고 전문적인 누수탐사 확대시행 ․․ 17~19

상수도관로 위치표지 설치사업   ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․   20

「유수율 제고를 위한」 블록시스템 구축사업

○ 2012년까지 유수율을 85% 이상으로 향상시켜 선진화된 급수체계

구축과 상수도 경영 효율화 도모하고

○ 맑고 깨끗한 수돗물을 공급하여 상수도 서비스의 품질을 높이고자 함.

□ 사업개요

○ 총사업비 : 1,436억원(공사비, 기본설계 용역비 등)

○ 사업기간 : 2006 ～ 2012(7년)

○ 사업내용

- 블록고립 및 균등수압 안정화 128개 블록

- 노후블록에 대한 노후관 및 불용관 집중정비 50개 블록

- 통합관리 전산감시시스템 구축 등

□ 그동안 추진상황

○ 기본계획 및 입찰안내서 작성 용역추진 ---’06.10월 ～‘07.8월

○ 입찰공고(조달청) ---------------------------   ‘07. 9.14

○ 실시설계 적격자 선정통보 및 추진 -----------   ‘08. 2.21

□ 문제점 및 대책

○ 실시설계 적격자 선정과 관련된 소송 계류 중

- 전주지방법원으로 부터“적격자 결정 무효확인(본안소송)사건의

판결 선고시까지 실시설계 적격심의를 하거나, 그 결과를 조달청에

통보하는 절차를 진행하여서는 안된다“ 는 내용으로 ”입찰절차 중지

가처분” 신청 건이 판결되었음.

⇒ 업체선정을 위한 행정절차 이행(적격심의 등)일시중지

□ 금후계획

○ 현재 진행중인 소송판결에 따라 추후 행정절차 이행 등 사업추진

상수도 100% 확대 공급사업

○ 상수도 공급혜택을 받지 못하고 지하수나 간이상수도를 사용하고 있는

농촌 변방동 및 고지대 마을에 맑고 깨끗한 수돗물을 공급하여

시민보건위생 향상

□ 사업개요

○ 사 업 량 : 배수관 포설 L=152㎞, 가압장 신설 8개소

○ 총사업비 : 18,515백만원

○ 사업기간 : 1999년 ～2010년(12년)

○ 수혜가구 : 125개마을 41,171세대 16,475명

□ 그동안 추진상황

○ 2007년까지 실적 : 배수관 포설 L=131.1㎞, 가압장 신설 6개소

- 사 업 비 : 14,840백만원(일반 6,870, 특별 7,970)

- 수혜가구 : 114개마을 3,824세대 15,180명

○ 2008년 추진상황

- 사 업 비 : 1,024백만원(당초 544, 1회 추경 480)

- 사 업 량 : 배수관 포설 L=6.6㎞, 가압장 신설 1개소

- 수혜가구 : 5개마을 111세대 400명

- 현재까지 추진내용

․ 본예산 확보분 공사중(우아동 관암․무능마을) -- 공정10%

⇒ 배수관 포설 L=3.0㎞, 가압장 1개소

□ 금후계획

○ 우아동 관암･무능마을 포설공사  ⇒  ‘08. 10월까지 마무리 완료

○ 추경예산 반영분인 아중로~아중마을간 배수관포설공사 외 3개소

⇒ ‘08. 7월중 사업 착수하여 11월 이내에 공사 마무리

대형 계량기실 확장 및 배관구조 개선사업

○ 부적정하게 설치되어 있는 대형계량기실을 확장 또는 구조개선

하여 계량기의 잦은 고장과 집단민원을 사전 예방하고, 상수도     사용량의 정확한 검침 및 적정요금 부과하기 위함.

□ 사업개요

○ 총사업비 : 600백만원(확장 420, 구조개선 180)

○ 사업기간 : 2007 ～ 2010(4년)

○ 사업내용 : 계량기실 확장 42개소, 배관구조개선 94개소

※ 80mm 이상 공동주택 주계량기실 : 266개소(완산165, 덕진101)

□ 그동안 추진상황

○ 2007년까지 추진실적

- 23개소 완료(계량기실 확장 13, 배관구조개선 10)

○ 2008년 추진상황

- 사 업 비 : 150 백만원

- 사 업 량 : 20개소(주계량기실확장 12, 배관구조개선 8)

- 현재까지 추진상황

․배관구조개선 완료   -------------------------   3개소

․주계량기실 확장공사 추진중   ----------------  12개소

□ 금후계획

○ 주계량기 확장 및 배관구조개선 사업  ⇒  10월말까지 사업 마무리

체계적이고 전문적인 누수탐사 확대 시행

○ 소중한 수자원을 보호하고자 전문적인 누수탐사를 실시하여 조기에     발견 복구함으로써 상수도 경영효율화 도모 및 유수율 제고 기여

□ 추진배경

○ 수도관 총 2,018km중 노후관이 52%(1,062km)로 많은 양의     수돗물이 새고 있어 상수도 경영악화의 주요인이 되고 있음

○ 누수 발생지역에 비해 전문인력 부족으로 체계적인 조치 미흡

▶ 대구광역시 사례

◦ 2004년 부터 민간업체와 누수탐사 병행 시행

◦ 2006년도에 약 370개소 누수탐사(자체 200, 민간업체 170)

- 년간 약50억원 예산절감 효과

□ 사업개요

○ 소요사업비 : 50백만원

○ 사 업 기 간 : ‘08. 3월 ～’08.12월

○ 사  업  량 : 연장 126㎞(배수관 117, 급수관 9)

※ 블록시스템 구축사업 지구는 제외

□ 그동안 추진상황

○ 현지조사 및 용역설계 완료  ----------------    ‘08. 3월

□ 금후계획

○ 유수율제고의 효율성을 기하기 위하여 현재 추진중인 블록시스템

구축사업과 병행 추진

누수탐사 시스템

탐사순서

탐사구간 설정

청음봉 탐사

정밀탐사(Sound Sens)

누수지점 재확인

누수지점 굴찰

누수확인후 복구

누수지점 굴착

누수확인후 복구

누수지점 재확인

탐사구간 설정

청음봉 탐사

정밀탐사(Sound Sens)

정밀탐사 방법

관로누수 발생시

관로누수 없을때

탐사장비 : Sound Sens

상수도관로 위치표지 설치사업

○ 관로파손 및 사고위험의 근원적 해소를 위하여 상수도관로 매설     위치에 표지판을 설치하여 각종 공사등으로 인한 수도관 파손을     사전에 예방하고 단수로 인한 시민불편 최소화.

□ 사업개요

○ 사 업 비 : 200백만원

○ 사업기간 : 2007년～ 2010년

○ 사 업 량 : 677㎞(송․도수관 57, 배수관 615)

○ 사업내용

- 상수도관이 매설된 하천제방, 고수부지, 도로 등에 위치표지 설치

․ 기존 상수관로 위치표지, 신규공사시 위치표지 의무화(설계반영)

□ 그동안 추진상황

○ L=65㎞ 완료(기존관로 20㎞, 신규관로 45㎞)

- 기존관로 : 전주천․삼천 하천둔치내 배수관 20㎞

․표지주(화강석) 328개소,  표지판 45개소

- 신규관로 : 표지못 960개소(배수관포설 공사시 병행)

□ 금후계획

○ 사 업 량 : L=48.4㎞(기존관로 40㎞, 신규관로 8.4㎞)

- 기존관로 약L= 40㎞ , 표지못 700개(관경100㎜이상)

- 신규 배수관 포설구간 L= 8.4㎞는 병행추진

○ 위    치 : 우아동, 인후동 및 농촌동(강흥동, 도도동, 도덕동, 용정동) 일대

⇒ 블록시스템 구축사업 제외 지역

○ 공사추진      -------------------------     ‘08. 9월~12월

⇒ 도로 덧씌우기 공사 등으로 인한 재시공 방지를 위하여

‘08. 11월말까지 마무리 추진

수질관리과  소관

『전국 최초』변방동지역 지하수 무료 수질검사

건강증진을 위한 시민 위주의 행정실현    ․․․․․  22

시민이 신뢰하는 깨끗한 수돗물 공급

수요자 중심의 『수돗물 품질검증』   ․․․․․․․․․․․․․  23

『국가공인 수질검사기관』 효율적 운영  ․․․․․․․․․․  24

맑고 깨끗한 사업장 시설물 유지관리  ․․․․․․․  25

『전국 최초』변방동지역 지하수 무료 수질검사

건강증진을 위한 시민 위주의 행정실현

○ 변방 자연마을의 지하수 음용세대에 대하여 무료로 수질검사를 실시

주민의 건강증진 및 편익을 제공하고 수질로 인한 불안감을 해소하여

시민에게 다가가는 행정서비스를 제공하고자 함

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2007년～2009년(3년간)

○ 대    상 : 변방동(10개동) 80개 마을(2,650세대)

○ 수질검사 개요

- 검사항목 : 일반세균외 16개 항목(음용 적합ㆍ부적합 검사)

- 수 수 료 : 면제 (면제금액 : 76,000원/건)

□ 그동안 추진상황

○ 지하수 수질검사 대상 파악 및 해당 동과 업무협의 --- ‘07.2월

- 대상지역(10개동) : 동서학동, 평화2동, 팔복동, 우아2동, 호성동,

송천1.2동, 동산동, 조촌동, 삼천3동

○ 2007년 수질검사 완료  - 조촌동 외 9개동 80개마을 759세대

※ 무료 수질검사로 인한 혜택 부여로 주민 호응도 높음.

○ 2008년 수질검사 실시  - 동서학동 외 1개동 19개마을 179세대

- 부적합세대에 수돗물 음용권장 및 정수기사용 등 대안제시

□ 금후계획

○ 매월 1~2개동씩 선정하여 하반기 수질검사 계속 추진

- 평화2동 등 8개동 61개마을 621개소 실시

○ 부적합세대에 대하여 지속적인 수질검사 및 관리

- 시민이 신뢰하는 깨끗한 수돗물 공급 -

수요자 중심의『수돗물 품질검증』

○ 안심하고 마실 수 있는 수돗물 공급을 위해 노력하고 있으나

수돗물의 불신이 상존

○ 고객이 참여하여 수돗물 품질을 검증하고 신뢰성을 제고

□ 사업개요

○ 수돗물평가 소비자 모니터링제 실시

○ 수돗물 품질인증제 및 수돗물 품질보고서 발행 지속추진

○ 상수원수부터 수도꼭지까지 철저한 수질관리 및 검사

- 규정항목보다 강화한 수질검사실시(정수 55개항목 ⇒ 91개항목)

□ 그동안 추진상황

○ 전국 정수장 평가결과『전주시 최우수 기관 선정』

- 전국 166개소 정수장을 대상으로 운영․관리 실태 종합평가

○『도내최초』수돗물 품질인증제 추진 : 500개소

○ 수돗물 신뢰도 향상을 위한『수돗물 품질보고서』배부 : 200,000부

○ 수질평가위원회 및 민․관합동 수질검사 : 각 1회

○ 상수도시설 투명성 제고 및 수돗물 평가

- 수돗물평가 소비자 모니터링요원 교육 : 66명

-『시민고객 참여』상수원관리 및 수돗물 생산과정 체험․공개 : 1,441명

□ 금후계획

○ 수돗물평가 소비자 모니터링제 지속 추진

- 수돗물 품질 및 개선에 관한 의견 수렴 및 수돗물 이상시 연락

○ 수돗물 품질인증제 실시(매월 100여개소)

○ 과학적인 수질관리․검사 및 품질고급화를 위한 연구과제 추진

- 주기(일․주․월별)적인 수질검사 및 연구자료 세미나 참석발표 등

『국가공인 수질검사기관』 효율적 운영

○ 국가공인 수질검사기관의 효율적인 운영을 위하여 검사기관의 신뢰성     제고와 지속적인 홍보로 신속한 민원서비스 제공

□ 운영현황

○ 국립환경과학원『먹는물 수질검사기관 제33호』지정 - ‘00.7.25

○ 검사범위 : 먹는물(수돗물 등), 상수원수, 먹는샘물, 각종 지하수

○ 수 수 료 : 5,300원/건 ～ 283,900원/건

□ 그동안 추진상황

○ 전국 수질분석능력(AQC) 및 현장평가 시행

- 결과 : 농약류등 8개 전항목『최우수』점수 획득(환산점수:100점)

○ 한국수원공사 전문교육 이수 : 6명

○ 수수료 수입증대를 위한 시․군 방문 직접수거(320건)

※ 수수료세입 : 100,933천원

○ 변방지역(자연부락) 지하수 무료수질검사 : 279개소

□ 금후계획

○ 대외 공신력 추구를 위한 검사기관 분석자 전문교육 이수

- 국립환경과학원 및 한국수자원공사 전문교육과정(8명)

○ 시․군 수질관리부서에 지속적인 기관홍보 추진(4회)

○ 공인 수질검사기관 협의체를 통한 선진기관 정보교류 확대

○ 변방지역 지하수 음용세대에 무료수질검사 지속 추진

맑고 깨끗한 사업장 시설물 유지관리

○ 수돗물생산의 효율적인 운영을 위하여 시설물의 개량 및 노후 된     시설물에 대해서 적기에 보수하여 안정적인 수돗물을 공급하고,      시민공개에 따른 공원 같은 상수도시설 사업장 환경조성

□ 사업개요

○ 상수도사업장 : 17개소 (취수장 5, 정수장 4, 배수지 8)

○ 사업장 시설물 개선 및 유지관리    ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ   37건  1,169백만원

○ 취․정수장 배수지 사업장 환경정비    ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ   19백만원

□ 그동안 추진상황

○ 기계장치 등 시설물 개선

- 전미취수장 전동구동장치 설치 등 6건   ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ   461백만원

○ 소규모 유지관리 수선

- 팔복․대성정수장 수전설비 보수 등 14건   ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ   46백만원

○ 사업장 환경정비(수목전지 및 제초작업) 실시   ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ   7회 실시

□ 금후계획

○ 장기사용 노후시설 및 수동 기계장치 등 중점 개량   ―   433백만원

- 대성정수장 밸브류, 공업용수 도수관 등

○ 취․정수시설 소규모 수선 및 유지관리   ――   75백만원

- 사업장 시설 및 도․송수관 시설점검 강화

○ 시민이 즐겨 찾는 공원같은 사업장 조성을 위한 환경정비 지속 추진

하 수 과  소관

하수찌꺼기 처리시설 설치사업   ․․․․․․․․․․․․․  27

하수처리 편입구역 하수관거사업  ․․․․․․․․  28

환경사업소 생물반응조 덮개설치 사업   ․․․․․․․․․․  29

하수관거정비 민간투자(BTL)사업  ․․․․․․․  30

화산․덕진 처리구역 하수관거 정비사업  ․․․  31

호성중학교(배미실)부근 하수관거 설치공사 ․․․  32

농촌마을 하수도 정비사업    ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․  33

하수찌꺼기 처리시설 설치사업

○ 2012년부터 해양투기 금지정책에 따른 대책마련 필요

○ 하수찌꺼기의 안정적 처리로 자연환경 보전에 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 후보지 공모방식으로 선정

○ 사업규모 : 하수찌꺼기 처리시설 150톤/일

○ 사 업 비 : 24,000백만원(국비 12,000, 지방비 12,000)

○ 사업기간 : 2006 ～ 2011(6개년)

□ 그동안 추진상황

○ 기본 및 실시설계 용역 착수  ---------------   ‘03. 8.26

○ 용역 중지(공정율 81%)  -------------------   ‘04.12. 6

○ 하수찌꺼기 적정처리방안 토론회 개최  ------   ‘07. 8.21

○ 하수찌꺼기 처리대책위원회 구성 및 회의(2회)  ---    ‘07.11. 5

○ 리싸이클링타운 입지 선정계획 결정공고  ------   ‘08. 4.15

○ 입지후보지응모 3개지역(상림동 상림마을, 삼천동 안산,삼산마을, 여의동 양마마을)

□ 문제점 및 대책

○ 2003년 사업비 140억원(시설용량 120톤/일)으로 사업을 추진

하여 왔으나 하수찌꺼기 발생량 증가 및 물가상승으로 소요

사업비 증가

⇨ 실시설계 용역결과에 따라 2009년 사업비 변경 추진.

□ 금후계획

○ 시설 입지선정(후보지 타당성조사,입지선정위원회 심의) --  ‘08. 9

○ 실시설계 용역 재 착공    -------------------------   ‘08. 9

○ 공사발주   -----------------------------------   ‘09. 3

○ 공사 준공 ------------------------------------  ‘11.12

하수처리 편입구역 하수관거사업

○ 도심하천 상류지역의 생활오수를 차집하여 하수처리장에 유입

○ 공공수역 수질오염 방지로 도심하천의 쾌적한 수변공간 제공

○ 농촌동 마을하수도 개량으로 시민 보건위생 증진

□ 사업개요

○ 위    치 : 평화동 장교마을등 48개마을(전주천3, 삼천34, 조촌천11)

○ 사 업 량 : 하수관거 설치  L=76.4km

○ 사 업 비 : 42,632백만원(국비 21,316, 지방비 21,316)

※‘08년예산:1,519백만원(국비 361, 시비 1,056, 기금 102)

○ 사업기간 : 2007 ~ 2011(5개년)

□ 그동안 추진상황

○ 하수도정비 기본계획 변경 승인(환경부)  --------  ‘07. 7

○ 지방재정 투융자 심사완료(행정자치부)  ---------  ‘07.10

○ 기본 및 실시설계 용역 완료  -------------------  ‘07.12

○ 설계자문 및 일상감사  -------------------------  ‘08. 2

○ 재원협의 및 기술검토(전주지방환경청)   --------  ‘08. 5

□ 금후계획

○ 공사발주        ----------------------------     ‘08. 6

○ 공사착공 및 전체공사 완료   ---------    ‘08. 8～’11.12

환경사업소 생물반응조 덮개설치 사업

○ 하수처리장에 적합한 악취방지 시설을 설치하여 인근 주민들의       악취민원 해소

○ 하수처리장이 혐오시설 이라는 인식에서 탈피 및 환경보전 체험교육장     으로 활용

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 송천동2가 환경사업소 내

○ 사업규모 : 생물반응조 덮개 1식(26,000㎡중 혐기/무산소조 9,500㎡)

태양광 발전시설 설치 1식

○ 사 업 비 : 7,900백만원(생물반응조 5,500. 태양광 2,400)

○ 사업기간 : 2008 ~ 2010 (3개년)

□ 그동안 추진상황

○ 구리시외 4개소 하수처리장 견학  ----------   ‘07. 4~10

○ 용역과제 심의완료 ------------------------    ‘08. 2.25

○ 예산 투ㆍ융자심사 완료 -------------------    ‘08. 6. 4

○ 실시설계용역 발주 ------------------------    ‘08. 6.12

□ 문제점 및 대책

○ 태양광 발전시설이 대체 에너지 개발 차원에서는 타당성이

있으나 경제성이 있는지 의문

⇨ 태양광 발전시설 설치를 면밀히 검토후 시행여부 결정

□ 금후계획

○ 실시설계용역 완료    ----------------------      ‘08.10

○ 공사발주(총괄발주) ------------------------      ‘08.11

○ 공사착공    -------------------------------      ‘08.11

○ 공사완료    -------------------------------      ‘10.12

하수관거정비 민간투자(BTL)사업

○ 민간자본 유치로 지역경기를 활성화 하고 정화조 폐쇄로 시민부담 경감

○ 오수관거 정비로 하천 수질개선 및 불명수를 차단 하수처리비 절감

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 일원(덕진, 아중, 중앙, 화산, 효자처리구역)

○ 사 업 량 : 하수관거 정비(우․오수 분리) L=127Km

○ 사 업 비 : 107,361백만원(민간자본)

○ 사업기간 : 2005 ～ 2010(6개년)

□ 그동안 추진상황(전체공정 27%)

○ 업무 위․수탁 협약체결(환경부, 도, 시, 환경관리공단)  ----  ‘05. 6

○ 민간사업자 사업계획서 평가및 우선협상대상자 선정 -  ‘05.10

○ 협상 및 사업시행자 지정(전주아랫물길(주))  ----  ‘06. 4

○ 우선시공분 시설사업 실시계획 승인 및 착공  ----  ‘06. 4

○ 전체분 시설사업 실시계획 승인 및 착공   ------   ‘07. 4

- 전체 127km 중 40km 완료

□ 금후계획

○ 사업시행(‘08년계획 52.9㎞ 중 20㎞완료)  ------  ’08.12

- 송천1,2동 : 0.55㎞, 덕진,금암1동(종합경기장일대) : 14.86㎞,

- 인후2,금암2동(모래내시장일대) : 12.64㎞, 인후1동(안골광장일대) : 2.71㎞

- 인후2,우아2동(전주역앞일대) : 6.79㎞, 효자4동(우전초교일대) : 2.35㎞

- 서완산, 동완산, 서서학, 평화1동 일대 : 13.03㎞

○ 공사준공     -------------------------------   2010. 4

○ 성과보증(13개월)  --------------------------   2011. 5

○ 사업시행자 관리운영(20년간)       ----------   2031. 5

화산․덕진 처리구역 하수관거 정비사업

○ 하수관거 우․오수 분리를 통하여 민간위탁중인 하수처리비 절감

○ 전주천, 삼천 수질개선과 건물 정화조 폐쇄로 시민 보건위생 향상

□ 사업개요

○ 위    치 : 화산처리구역 1․4․7분구, 덕진처리구역 1분구

○ 사업규모 : 우․오수관거정비 L=66.3㎞

○ 사 업 비 : 40,416백만원(국비 20,208, 지방비 20,208)

※연도별투자 : 기투자 35,064, ’08년 3,256, ’09년 2,096백만원

○ 사업기간 : 2004 ～ 2009(6개년)

□ 그동안 추진상황(전체공정 90%)

○ 하수관거 정비공사 착공     ------------------     ‘04.4

- 동서학동, 덕진동, 금암동 일대 L=34.0Km완료 ----   ‘ 06.12

- 효자택지, 호반촌, 6지구 일대 L=30.0Km 완료 --  ‘07.12

○ 금암동 금암초교, 호반촌, 6지구 일대 시행중  ----  ‘08. 2～ 7

- L=0.6㎞ 중 0.56㎞ 완료, 가정배수관 457개소 완료

□ 금후계획

○ ‘08년 국비 10억원 추가확보액 공사시행  -----  2008. 7～11

- 서서학동 거산황궁아파트주변, 인후동 효성연립부근 오수관거

- 평화동 편안2길 우수관거개량 등

○ 전체 사업 완료     ------------------------    2009.10

호성중학교(배미실)부근 하수관거 설치공사

○ 호성동 호성중학교부근 집중호우시 농경지(약 30㏊) 침수 피해발생 예방

○ 우기시 호성중학교 인근 도로 침수로 주민 및 학생 통행 불편해소

○ 하수관거사업으로 상습 침수지역 피해 예방 및 생활 불편 최소화

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 호성동 호성중학교부근(텃골～배미실)

○ 사 업 량 : 우수관거 L=1,118m, 오수관거 L=1,543m

- 1차사업(‘07년) : 우수관거 629m, 오수관거 1,116m

- 2차사업(‘08년) : 우수관거 489m, 오수관거   427m

○ 사 업 비 : 1,325백만원 (2007년 857, 2008년 468)

○ 사업기간 : 2007. 10 ~ 2008. 10(2개년)

□ 그동안 추진상황(전체공정 78%)

○ 1차사업 공사추진 완료     ------------       2008.6월

○ 2차사업 공사추진  ⇒  2008.04월 착수(현공정 50%)

- 우수관거 L=489m중 220m완료

- 오수관거 L=427m중 220m완료

□ 금후계획

○ 공사완료    --------------------------------     ‘08.10

농촌마을 하수도 정비사업

○ 농촌지역의 열악한 주거환경을 개선하여 주민생활 편익도모

○ 공공수역의 수질개선과 지역주민의 보건위생 향상에 기여

□ 사업개요

○ 사업규모 : 27개지구(완산 7,  덕진 20)

- 가구수 : 3,506가구(완산 882,  덕진 2,624)

- 인구수 : 10,042명 (완산 2,334,  덕진 7,708)

○ 사 업 비 : 38,600백만원(국비 70%, 시비 30%)

○ 기    간 : 2005 ~ 2012(8개년)

□ 그동안 추진상황

○ 한절외 11개지구(완산6, 덕진6) 완공(5,788백만원)  --    ’07.12

○ 조직개편에 따른 업무인계인수(주택과⇒하수과)   -----   ‘08. 3

○ 공덕, 추동지구 공사추진 완료(2,800백만원)   --------    ’08. 6

○ 아중ㆍ용계지구 공사발주(1,400백만원)   -------------    ‘08. 6

□ 금후계획

○ 아중ㆍ용계지구 공사추진 완료    ------------     ‘08.12

○ 미 시설지구 년차별 추진      ---------------   ‘09.~’12

- 지구수 : 12개지구 (덕진구 원동지구외 11개지구)

- 마을수 : 47개마을(2,092세대, 6,295명)

- 사업비 : 28,612백만원