제259회 전주시의회 제2차정례회

행정사무감사 / 도시건설위원회

2008년도

주요업무 추진상황 보고

예 술 도 시 국

보  고  순  서

□	일 반 현 황		-------	1
□	부 서 별 주 요 기 능		-------	2
□	기 본 현 황		-------	3
□	주요업무 추진상황
	○	아 트 폴 리 스 과	-------	7
	○	생 태 복 원 과	-------	23
	○	푸 른 도 시 조 성 과	-------	32
	○	환 경 과	-------	52

일  반  현  황

□ 기   구 : 4과 15담당

										예술도시국
	아트폴리스과 (3담당)							생태복원과 (3담당)								푸른도시조성과 (4담당)							환 경 과 (5담당)
	도시예술담당							도심생태담당								푸른도시관리담당							환경정책담당
	도시경관담당							노송천복원담당								푸른도시조성담당							환경지도담당
	공공디자인담당							하천관리담당								공원조성담당							환경총량담당
																산림관리담당							위생관리담당
																							체험시설관리담당

□ 정‧현원

과 별		총 계	일 반 직						기능	비고
			4급	5급	6급	7급	8급	9급
계	정 원	63	1	4	15	18	15	2	8
	현 원	62	1	4	15	24	8	2	8
아트폴리스과	정 원	12	1	1	3	4	2	-	1
	현 원	12	1	1	3	4	2	-	1
생태복원과	정 원	12		1	3	4	3	-	1
	현 원	12		1	3	6	1	-	1
푸른도시 조 성 과	정 원	18		1	4	6	3	1	3
	현 원	18		1	4	5	4	1	3
환 경 과	정 원	21		1	5	4	7	1	3
	현 원	20		1	5	9	1	1	3

*휴직 : 1명(공무원노조1)

부서별 주요기능

과 별	분 장 사 무
아트폴리스과	○ 전주 아트폴리스 정책 총괄 ○ 기본(특정)경관계획 수립에 관한 사항 ○ 전주시 경관위원회 운영 ○ 전주 아트폴리스 홍보전략 수립 ○ 옥외광고물 관리 및 정비에 관한 업무 총괄 ○ 간판가이드라인 및 디자인 개발 ○ 가로시설물 통합업무 정책수립 및 사업총괄 ○ 디자인 가이드라인 제정 및 운영에 관한 사항
생태복원과	○ 도심생태 복원계획 수립 ○ 친수광장 조성사업 추진 ○ 노송천 복원 프로젝트 추진 ○ 생태하천 복원사업 추진 ○ 하천 유지관리 업무추진
푸른도시 조 성 과	○ 도시녹화사업의 종합계획수립 ○ 가로수 식재계획 수립 및 녹지시설물 관리 ○ 국토공원화사업 추진 ○ 공원조성계획 수립 및 조성사업 ○ 시립양묘장 관리 ○ 산불방지 최소화 대책 및 산림사업 추진
환 경 과	○ 5대 역동산업(생태관광분야) 종합추진 ○ 환경보전 및 에코도시조성 중․장기 종합계획 수립․시행 ○ 기후변화대응 종합계획 수립․추진 ○ 자연생태박물관 시설 및 관리운영 ○ 전주천, 삼천 단기‧중장기 수질개선 사업추진 ○ 수질오염총량제 종합계획 수립․시행 ○ 도심 대기질 개선 및 다중이용시설 실내공기질 관리 종합 추진 ○ 환경오염배출업소 지도․점검 종합계획 수립․추진 ○ 식품안전관리 종합계획 수립․시행

기  본  현  황

□ 광고업 등록 및 옥외광고물 현황

(단위 : 개)

광고업자 등록현황	시 지 정 광 고시 설				옥외광고물	비 고
	계	게시대	벽보판	기 타
371	302	150	152	-	40,556

※ 신형벽보판 50개소 11월 설치

□ 하천현황

(단위 : ㎞)

구 분		개소	하천연장	제 방 연 장			개수율 (%)	비고
				계	기개수	미개수
계		24	102.2	177.7	141.3	36.4	79.5
법정하천	소 계	21	96.2	164.9	134.9	30.0	81.8
	국가하천	3	14.8	28.8	28.8	0	100.0
	지방하천	18	81.4	136.1	106.1	30.0	78.0
소 하 천		3	6.0	12.8	6.4	6.4	50.0

□ 공원현황

(단위 : 개소, ㎡)

공원의 종 류	공원수 (조성)	공 원 면 적			비 고
		계	조 성	미 조성
계	167 (141)	21,224,879.7	4,938,039.7	16,286,840
도립공원	1 (0)	6,005,241	0	6,005,241	∙미조성(1) : 모악산
도시자연공원	5 (1)	8,473,922	1,255,275	7,218,647	∙일부조성(1) : 기린공원 ∙미 조 성(4) : 산성,삼천 천잠,황방산
근 린 공 원	35 (28)	6,055,869.1	2,973,079.1	3,082,790	∙조 성 : 중앙공원등24개소 ∙일부조성(4) : 화산,완산,인후,덕진 ∙미 조 성(7) : 다가,신성,안행,가련산. 효자5택지1,2,하가택지
주 제 공 원	2 (1)	428,579	421,320	7,259	∙조 성(1) : 묘지공원 ∙미 조 성(1) : 태평문학공원
어린이 공원	123 (111)	260,501.6	228,365.6	32,136	∙조 성 : 노송공원 등 111개소 ∙미조성(12) : 평화제1,효자공원, 태평어린이,효자5택지1,2,3,4,5,6, 하가택지1,2,3
소 공 원	1 (0)	767	0	767	∙미 조 성(1) : 태평소공원

□ 공원 분포현황

구분	도시계획구역		공 원 면 적			공 원 결정율 (C/A)	1인당 공원면적
	면적(A)	인구(B)	결정(C)	조성(D)	조성율 (D/C)		결 정 (C/B)	조 성 (D/B)
계	313.2㎢	635천명	21.2㎢	4.9㎢	23.1%	6.7%	29.95㎡	7.7㎡

※ 1인당 공원면적 : 수원 10.1/2.4, 성남 19.9/10.8, 안양 14.2/1.9

□ 공원시설물 현황

(단위:점)

계	근 린 공원	어린이공원	도시자연공원	비 고
6,018	2,777	2,766	475

□ 가로수 식재 현황

(단위:주)

노선수	계	수 종 별
		은행나무	느티나무	벚나무	단풍나무	기 타
124	39,089	13,057	6,873	5,733	3,133	10,293

□ 보호수 및 노거수 현황

(단위:주)

구 분	계	느티나무	왕버들	은행나무	팽나무	회화나무	참죽나무	주엽나무	소나무
보호수	26	9	7	7	1	1	1
노거수	67	19	27	2	15	2		1	1

□ 소유별 임야면적

(단위:㏊)

총 계	사유림	국유림	공유림	비 고
6,487	5,712	704	71

□ 보전산지 현황

(단위:㏊)

계	보전녹지	자연공원	문 화 재 보호구역	조 수 보호구역	사찰림	비고
4,351	3,678	599	45	23	6

□ 시립 양묘장

위 치		면 적 (㎡)	시 설 (동)	연간생산 (천본)	보유장비
포지별	2개소	29,936	비닐하우스:24 관리사 : 3 창 고 : 1	670
제1포지 (삼천동)	완산구 삼천동 1가 546-1	10,000	비닐하우스:15 관리사 : 3 창 고 : 1	160	트렉타, 경운기, 관리기
제2포지 (호동골)	덕진구 우아동 1가 851	19,936	비닐하우스: 9	510	온풍기 등

□ 천연가스보급 및 충전시설

구 분	계	차량별 현황
		시내버스	청소차량	장애인저상	기 타
천연가스차량(대)	378	355	20	3
충전시설(기․대)	11	고정식 7기(호남여객 2, 전일여객 3, 광역소각장 2) 이동식 4대(전주대 회차지 2, 삼례터미널 2)

□ 대기오염자동측정망

구 분	계	지 역 별
		주거지역	상업지역	공업지역	도 로 변
시설종류	4개소	효자2동 옥상	중앙동 옥상 (구 태평동사무소)	청소년자유 센터 옥상	금암광장

※측정항목 : 아황산가스(SO2), 이산화질소(NO2), 일산화탄소(CO), 오존(O3),

(6개 항목)   미세먼지(PM-10), 기상(풍향․풍속․온도․습도)

□ 환경오염물질 배출업소

(단위 : 개소)

구 분	계	대기 수질	소음 진동	비산 먼지	기타수질 유독물	다 중 이용시설	토양오염 유발시설	의 료 폐기물
계	2,638	594	74	241	443	102	306	878

□ 공중․개방화장실

(단위 : 개소)

구 분	합 계	공 원	문화 시설	역․터미널	재래시장 대규모점포	체육 시설	기타	개 방 화장실
계	219	47	24	12	24	22	16	74
완산구	132	42	14	2	16	6	2	50
덕진구	87	5	10	10	8	16	14	24

□ 식품위생업소

(단위 : 개소)

구 분	계	식 품 접 객 업							집 단 급식소	식 품 제 조 가공업	즉석 판매 제조가공업	식품 소분업	식 품 판매업 운반업 용기포장
		소계	휴게 음식	일반 음식	단란 주점	유흥 주점	제과점	위탁급식
계	10,746	7,454	928	5,773	140	329	219	65	455	202	962	145	1,528
완산구	6,149	4,250	547	3,325	71	130	142	35	245	93	590	77	894
덕진구	4,597	3,204	381	2,448	69	199	77	30	210	109	372	68	634

□ 공중위생업소 현황

(단위 : 개소)

구 분	계	숙박	목욕	이용	미 용				위생관련영업	위생 용품	공중이용시설
					미용	종합	일반	피부
계	2,820	351	88	307	16	1,134	78	2	626	5	213
완산구	1,547	114	51	173	8	632	57	0	349	1	162
덕진구	1,273	237	37	134	8	502	21	2	277	4	51

아트폴리스과 소관

ꊱ	전주시 기본경관계획 수립	----------------									9
ꊲ	전주시 경관조례 제정 및 경관위원회 구성․운영									-	10
ꊳ	전주시 야간경관계획 수립		----------------								12
ꊴ	전주시 공공디자인 가이드라인 수립						-------				13
ꊵ	아름다운 간판디자인 및 시스템 개발							-----			14
ꊶ	「시 지정 벽보판 및 현수막 게시대」 시설 개선 및 민간위탁 추진			--------------							15
ꊷ	공공시설물 표준디자인 현상설계 공모								-----		17
ꊸ	전국 대학생 아트폴리스 작품 공모					--------					18
ꊹ	전주시 도시브랜드(Brand Identity) 개발							-----			19
	2008년 도시계획 국제 심포지움				---------						20
	2008 대한민국 공공디자인엑스포 참가							-----			21
	Good Sign Festival 전시행사 참가							-----			22

□ 2008년 주요성과

○ 우리시는 전통과 현대가 어우러져 밝고 아름다운 도시 B&B(Bright & Beautiful) 전주를 만들어 가기 위해

○ 2008년을 아트폴리스 전주 원년의 해로 정하고 5대 역동산업과 함께 시정의 최우선과제로 본격 추진해가고 있음

○ 따라서 1월에 아트폴리스 전주가 나가야 할 추진방향과 원칙을 정립하였고, 10대 중점 추진전략을 마련하여 추진해 왔으며

○ 지난 2월25일 조직개편시 아트폴리스과를 신설하여 과장을 비롯한 디자인 전문가 3명을 공모를 통해 임용하였음

○ 전주시 전체에 대한 경관을 체계적으로 관리하기 위하여 기본경관계획 수립과 경관조례를 제정하였으며, 시에서 추진하는 모든 사업에 대해 아트폴리스 자문을 거치도록 하는 등 추진체계를 확립함

□ 2009년 운영방향

○ 전주시의 체계적 경관관리를 위해 수립한 기본경관계획과 경관조례를 토대로 아름다운 경관형성을 시민들이 주도하고 행정이 뒷받침 할 수 있는 실천방안의 마련과 거버넌스를 구축하는 한편

○ 규제위주의 경관협정 운영보다는 적극적인 인센티브 제공을 통해 주민참여의 활성화를 도모해 나가고자 함

○ 기본경관계획 등 여러 계획들에 대한 관리‧조정을 위하여 경관축 및 조망축별 경관형성을 위한 특정경관계획 수립과 선도사업 추진으로 아름다운 도시경관 조성

○ 전주의 BI를 개발하여 정체성을 확립하고 옥외광고물 가이드라인을 적용한 시범거리 조성을 통하여 조화로운 가로이미지 창출하고,

○ 2009년도 아트폴리스 10대 선도사업 발굴 추진을 통해 밝고 아름다운 전주를 조성하는데 노력하겠음

전주시 기본경관계획 수립

○ 전주시의 체계적 경관관리를 위하여 각종 경관자원의 보전‧

관리 및 형성에 필요한 사항들을 정하고(경관법 제6조)

○ 아름답고 쾌적하며 지역특성을 나타내는 도시 및 지역 환경

조성에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 용역기간 : ’07.12 ~ ’08.12

○ 용 역 비 : 175백만원

○ 용역기관 : 사)한국도시설계학회(회장 온영태)

○ 과업의 범위 및 내용

- 범   위 : 전주시 전역

- 내   용 : 경관 현황조사 및 분석, 기본구상, 기본계획 및 관리계획 수립

□ 추진상황

○ 전주시 경관계획 용역 추진계획 수립	: ’07. 9.11

○ 과업지시서 등 자문 검토(아트폴리스위원회, 감사실) : ’07. 9~10

○ 용역 발주의뢰	: ’07.11.28

○ 용역 착수보고	: ’08. 1.10

○ 용역중간보고회(2차)	: ’08. 5.14 / 9.24

○ 도시건설위원회 간담회(3차)	: ’08. 5.28 / 8.28 / 10.16

○ 경관축별 워크숍 및 현장답사(도시건설위, 시민단체) : ’08.6.25~6.27

○ 주민 공청회	: ’08.10.10

○ 전주시의회 의견청취	: ’08.10.23

○ 최종보고	: ’08.11.14

○ 경관위원회 심의	: ’08.11.17

□ 금후계획

○ 전북도 승인 신청 : ’08. 11월

○ 공고 및 주민열람 : ’08. 12월

○ 기본경관계획 세부실천계획 수립 : ’09. 1월부터

전주시 경관조례 제정 및 경관위원회 구성․운영

① 전주시 경관조례 제정

○「경관법」및 동법 시행령이 제정 시행됨에 따라 법령에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정하여

○ 우수한 경관을 보전하고 새로운 경관을 개성 있게 창출·관리함으로써 아름답고 쾌적한 도시 생활환경을 조성하고자 함

□ 개    요

○ 관련근거 : 경관법 및 같은 법 시행령(’07.11.18 시행)

○ 주요내용

◦ 제1장 총칙       ◦ 제2장 경관계획    ◦ 제3장 경관사업

◦ 제4장 경관협정   ◦ 제5장 경관위원회

□ 추진상황

○ 타 시‧군 제정 사례 조사 검토	: ’08. 3월

○ 1차 도시건설위원회 간담회	: ’08. 4.16

○ 조례안 입법예고(21일간)	: ’08. 5.15~6. 4

○ 2차 도시건설위원회 간담회	: ’08. 5.21

○ 조례심사(감사담당관)	: ’08. 5.29

○ 전주시 조례규칙심의회 심의	: ’08. 6. 4

○ 조례안 심의의결(제254회 임시회)	: ’08. 6.20

○ 공포·시행	: ’08. 7. 9

□ 금후계획

○ 경관위원회 심의․자문대상 등 조례개정 추진

- ’09. 1월(기본경관계획 확정 후)

② 전주시 경관위원회 구성․운영

□ 개    요

○ 관련근거 : 경관법 제23조 내지 제25조 및 동법시행령 제18조

전주시 경관조례 제16조, 제20조

○ 기    능 : 경관과 관련된 사항에 대한 심의 또는 자문 수행

- 심의대상 ∘경관계획의 수립 또는 변경, 승인

∘경관사업의 승인, 경관협정의 인가 등

- 자문대상 ∘경관계획에 관한 사항

∘경관지구 및 미관지구의 관리 및 운용에 관한 사항

∘경관사업의 계획 및 추진에 관한 사항 등

○ 경관위원회 구성기준(경관조례 제20조)

- 위원장과 부위원장 각 1명을 포함한 10명 이상 20명 이내

- 위촉대상 : 지방의회의원, 공무원, 분야별 전문가(전체 위원의 1/2이상)

- 임    기 : 2년

□ 추진상황

○ 제1대 전주시 경관위원회 위원 위촉 : ’08. 8.20

※ 위촉현황

계	전문가	시의원	공무원	비고
20명	18	1	1

- 전문분야(18) : 건축3, 도시3, 조경2, 토목1, 교통1, 환경1, 문화1, 디자인6

□ 금후계획

○ 위원회 개최 정례화 : 매월 셋째 주 수요일 / 필요시 수시

○ 공공사업 자문 소위원회 운영 강화 : 수시 개최

전주시 야간 경관계획 수립

○ 전주시 야간경관 요소를 조사·연구하여 향후 시행하는 야간경관 관련

사업에 대한 세부실행 가이드라인 및 연차별 추진계획을 마련

○ 전주시 야간경관을 체계적이고 효율적으로 시행 추진하여

전주 아트폴리스 조성에 만전을 기하고자 함

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 전주시 야간경관계획 및 야간조명 가이드라인 수립 용역

○ 용역기간 : 착수일로부터 7개월

○ 소요예산 : 130백만원

○ 과업의 범위 및 대상

- 범   위 : 전주시 전역

- 대   상 : 문화재, 지천, 상징물, 오픈 스페이스(공공공간),

주요 간선도로, 민간건축물 및 공공시설물 등에 대한 전주의 야간경관 사업대상 시설물

□ 추진상황

○ 전주시 야간경관계획 추진계획 수립	: ’08. 5. 8

○ 용역과제 심의위원회 심의․의결	: ’08. 6. 5

○ ’08. 제1회 추경예산 반영	: ’08. 6.20

○ 일상감사(감사담당관)	: ’08. 9.19

○ 용역입찰공고(유찰 ’08.10.29)	: ’08.10. 1

○ 용역입찰 재공고	: ’08.11. 3

□ 금후계획

○ 용역 입찰 접수   : ’08.11.24

○ 용역착수 및 완료 : ’08.12 ~ ’09. 6

전주시 공공디자인가이드라인 수립

○ 전주시 아트폴리스 추진 관련 세부 가이드라인을 마련하여 공공디자인사업을 효율적으로 시행하고,

○ 아트폴리스 관련 사업의 확대에 따른 디자인관련 심의위원회의 심의기준 등으로 활용해 전주시 공공디자인 질적 수준 향상 도모

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 전주시 공공디자인가이드라인 수립 용역

○ 사업기간 : 계약일로부터 7개월

○ 사업예산 : 130백만원

○ 사업내용

- 전주시 공공디자인 방향 설정을 위한 기초현황 조사․분석

- 공공디자인 가이드라인 수립 및 매뉴얼 제시

∙공공건축물, 공공시설물, 공공공간, 공공시각매체 등 4개 분야

□ 추진상황

○ 공공디자인가이드라인 수립 계획  : ’08. 5

○ 용역과제심의위원회 심의․의결   : ’08. 6

○ ’08. 제1회 추경예산 확보        : ’08. 6

○ 용역과제 사전심사(감사담당관) : ’08. 9

○ 용역입찰공고                    : ’08.10. 1

○ 입찰결과(유찰)                  : ’08.10.22

○ 참가자격 및 과업범위 재검토     : ’08.10.24

○ 용역발주 재공고                 : ’08.11. 3

□ 금후계획

○ 용역업체 선정	: ’08.11월말

○ 용역착수 및 완료	: ’08.12~’09. 6(예정)

아름다운 간판디자인 및 시스템 개발

○ 우리시 거리특성에 맞는 옥외간판 조성 기본계획을 수립하여

간판의 디자인(글꼴, 색상, 형태 등) 및 시스템 개발 기준을 제시하고

○ 거리별 특성에 맞고 전주 이미지에 부합하는 간판을 설치하여

조화롭고 아름다운 간판 문화를 만들어 가고자 함

□ 용역개요

○ 대상간판 : 가로형 간판 등 옥외광고물

○ 주요내용

- 신규 택지개발지역의 간판설치규격 및 수량 등 가이드라인 개발

- 우리시 특성에 맞은 간판의 글꼴, 색체, 형태 등 표준디자인 개발

○ 용 역 비 : 50백만원(도급액 43,941천원)

○ 용역기간 : ’07.10. 9 ~ ’08. 3. 8 ⇨ 연장 ’08.10.31

※ ’08.1.3 아트폴리스추진위원회 자문결과 전주시 기본경관계획

권역별 특성반영 추진

□ 추진상황

○ 용역과제 심의․의결                 : ’07. 5.28

○ 용역발주계약(호원대학교 산학협력단) : ’07.10. 5

○ 착        수                        : ’07.10. 9

○ 아트폴리스 위원회 자문(1,2차)       : ’07.10.25 / ’08.1.3

○ 간판 현황조사 완료                  : ’07.11.30

○ 도시건설위원회 간담회               : ’08. 8.28

○ 전문가 자문회의(2회)                : ’08. 9.29 / 10.14

○ 최종보고회                          : ’08.10.27

○ 용역납품                            : ’08.10.31

□ 금후계획

○ 홍보 및 활용계획 수립․추진          : ’08.11~12

「시 지정 벽보판 및 현수막 게시대」

시설 개선 및 민간위탁 추진

○ 아름답고 사용하기 편리한 벽보판으로 디자인하고 경관을 해치는 현수막 게시대를 이설함으로써 도시경관 개선

○ 관련법규를 준수하고, 효율적인 관리․운영을 위하여 민간에 위탁함으로서 보다 나은 서비스를 시민들에게 제공하고자 함

① 시설개선사업

□ 사업개요

○ 사업내용 : 구형벽보판 철거 후 신형벽보판 설치

- 구형벽보판 철거(202개소) : ’08년(100개소), ’09년(102개소)

- 신형벽보판 설치(50개)    : ’08년(50개)

- 보행자 안내 사인탑 철거(38개소)

- 현수막 게시대 이설(20개소) → ’09년 시행

○ 설치지역 : 도시미관을 저해하지 않으며, 주요간선도로 보행  공간이 확보된 지역 및 다중집합장소에 설치

○ 사 업 비 : 200백만원 / 도급액 172백만원

○ 도 급 자 : 삼호광고(대표 오상봉)

○ 사업기간 : ’08. 4~12월

□ 추진상황

○ 설치예정지 및 디자인검토(아트폴리스위원회) : ’08.4.24

○ 벽보판 디자인 도시건설위원회 간담회        : ’08.8.28

○ 벽보판 디자인 확정                         : ’08.9.11

○ 벽보판 신규 제작ㆍ설치 시행 의뢰           : ’08.9.24

○ 보행자 안내 사인탑 철거(38개소) 및 마무리작업 : ’08.10.29~11. 5

○ 구형 벽보판 철거(100개소 200개)	: ’08.11.10~11.15

□ 금후계획

○ 신규 벽보판 제작ㆍ설치(50개소) : ’08.10.29~11.30

② 민간위탁 추진

□ 위탁근거

○ 옥외광고물등관리법 제9조 및 시행령 제40조(안전도검사업무의 위탁 등)

○ 옥외광고물관리조례 제24조 내지 제26조(안전도검사 위탁자격,시설기준,절차)

○ 옥외광고물관리조례 제28조(현수막 지정게시대 위탁 등)

○ 전주시 사무의 민간위탁 조례 및 시행규칙

□ 위탁현황

구 분	수 량	수탁기관	협 약 기 간	비 고
게시대	150개	광고협회 전주시지회	’05.6.1~’08.5.31(3년)	’08.12.31까지 재협약
벽보판	202개소	“	’05.10.1~’08.9.30(3년)	’08.10.1부터 구청관리

□ 2009년 위탁계획

○ 대상시설 : 현수막게시대  150개소

시지정 벽보판 152개소(신형50, 구형102)

※구형벽보판은 철거시까지 한시적 위탁

○ 대상업무 : 옥외광고물 신고 및 접수대행, 안전도 검사

○ 위탁기간

- 시 지정 현수막 게시대 및 벽보판 : ’09.1.1~’10.12.31(2년)

- 옥외광고물 등 안전도 검사      : ’09.1.1~’11.12.31(3년)

□ 추진상항

○ 제258회 전주시의회 민간위탁동의안 의결   : ’08.10.23

○ 관리 및 안전도검사 수탁기관 모집계획 수립 : ’08.11. 6

○ 수탁기관 모집공고	: ’08.11.11~11.20

□ 금후계획

○ 수탁자 선정 및 협약체결 : ’08.12월

○ 민간위탁 시행           : ’09. 1월

공공시설물 표준디자인 현상설계 공모

○ 기존 가로시설물은 기능적인 측면만 고려된 디자인으로

설치되어 도시미관의 저해요소로 작용하고 있어

○ 공공시설물에 대한 표준디자인 정립을 통하여 전주의 브랜드

가치를 높이고 정체성을 확립하고자 함

□ 사업개요

○ 공모대상 : 공공시설물(5종) 표준디자인 개발

- 맨홀뚜껑, 볼라드, 수목보호판, 벤치, 버스안내표지판

○ 응모자격 : 디자인 및 건축관련 전문업체, 산학협력단을 통한 교수

○ 시상계획 : 시상금 69백만원

- 최우수작(1점) : 상금 30백만원

- 우 수 작(2점) : 상금 15백만원

- 가    작(3점) : 상금  3백만원

□ 추진상황

○ 공고 및 지침서 교부           : ’08. 4.18 ~ 4.28

○ 공모작품 접수(총 13개점)       : ’08. 6.16 ~ 6.17

○ 작품심사 및 입상작 선정        : ’08. 6.20

- 5점(우수작 2점, 가작 3점) / *최우수작은 미선정

○ 입상작품 전시(시청 로비)       : ’08. 7.24 ~ 7.25

○ 실시설계 대상 표준디자인 선정  : ’08. 8.21

○ 표준디자인 실시설계 용역착수   : ’08.10.27

□ 금후계획

○ 표준디자인 실시설계 용역 준공  : ’09.2.12

○ 표준디자인 매뉴얼집 발간 전 사업부서 배부

- 향후 시범가로 및 신규도로 개설시 적용

전국 대학생 아트폴리스 작품 공모

○ 대학과 지역사회의 커뮤니케이션을 통해 전주 아트폴리스

저변확대 및 창작활동 활성화에 기여

○ 예술적인 도시 전주의 목적에 부합하는 획기적이고 창의적인

작품모집을 위한 공모전 실시

□ 사업개요

○ 공모주제 : 3개 분야

- 나들목 및 전주시계 국도변 상징조형물

- 시민과 함께하는 전주역 광장 조성

- 동물원 복합형 관리사무소 신축

○ 참가자격 : 전국 대학(교) 학생 및 대학원생

○ 시상계획 : 분야별 시상금 4,950만원(총 36점)

- 대  상 : 분야별 1점씩(시상금 각 500만원)

- 금  상 : 분야별 1점씩(시상금 각 300만원)

- 은  상 : 분야별 2점씩(시상금 각 150만원)

- 동  상 : 분야별 3점씩(시상금 각 100만원)

- 장려상 : 분야별 5점씩(시상금 각  50만원)

□ 추진상황

○ 공    고                          : ’08. 6. 3

○ 전국 대학교 공문 발송 및 참여 홍보 : ’08. 6. 3 ~  6.24

○ 공모작품 접수(총41점, *응모신청 91) : ’08.10. 7 ~ 10. 9

○ 작품심사 및 입상작 선정           : ’08.10.17

- 32점(금상3, 은상6, 동상9, 장려상14) / *대상은 미선정

○ 입상작품 전시(시청 로비)          : ’08.11. 5 ~ 11. 6

□ 금후계획

○ 작품집 발간 실․과․소 및 구청 배부       : ’09. 1월중

○ 수상작품은 해당부서에서 작품활용방안 강구 : ’08.12월

전주시 도시브랜드(Brand Identity) 개발

○ 우리시를 대표하는 이미지가 CI(심볼마크) 이외에 비빔밥, Onn, 싱이 등 다양하게 인식되고 있음에 따라, “전주하면 떠오르는 통일된 브랜드 이미지” 필요

○ 세계화･지방화시대 천년전주의 정체성과 미래 비전이 담겨있는 브랜드를 개발하여 세계적인 도시로서 경쟁력 강화 필요

□ 사업개요

○ 사업기간 : ’08.10 ～ ’09. 3(6개월)

○ 사 업 비 : 200백만원(국비100백만원, 시비100백만원)

○ 사업내용

- 브랜드 슬로건 개발, 디자인 매뉴얼 제작 등

- BI 관리 매뉴얼 Book 제작(책자 및 CD), 디자인 시안제작 등

- 브랜드 홍보 및 브랜드 마케팅 전략 수립, 상표출원등록

- 공공시설물 표준디자인 개발

※ 성공사례 : 뉴욕의 ‘I Love NY’, 도쿄의 ‘YES Tokyo’, 서울의 ‘Hi Seoul’

□ 추진상황

○ 전주시 BI 개발 세부추진계획 수정․보완	: ’08.3월

○ 지식경제부의「2008 산업디자인개발사업」공모 선정 : ’08.8월

○ 공모 선정 후 3자협약(한국디자인진흥원+전주시+업체) 체결 : ’08.9월

- 공공디자인개발 사업 총괄 추진 관리 : 한국디자인진흥원

○ 도시브랜드 및 공공시설물디자인 개발 착수 : ’08.10. 1

○ 기초현황 조사 및 디자인 컨셉 설정    : ’08.10 ~ 11월

□ 금후계획

○ 디자인 개발 : ’08.12 ~ ’09. 3

○ 상표출원 및 선포식, 마케팅 추진 : ’09.4월 ~

2008년 도시계획 국제 심포지움

○ 도시 및 가로경관, 공공디자인 등을 대상으로 참가국간 모범사례 소개 및 분석 등을 통한 관련정보의 공유

○ 국제 행사 개최를 통해 아트폴리스 전주를 세계에 알리고 전주시의 경쟁력 확보와 도시이미지 제고

□ 사업개요

○ 행 사 명 :「한․대․일 도시계획 국제 심포지움」

○ 기    간 : ’08.8.21 ~ 8.23 (3일)

- 8.22일(1일) 전주 아트폴리스를 주제로 정책세미나

○ 장    소 : 전북대학교

○ 참가대상 : 300여명

- 한국, 대만, 일본, 홍콩의 도시계획관련 학자 및 연구생 등

○ 주요내용 : 학술대회, 정책세미나(전주 아트폴리스 ABC),

한옥마을 투어 등

※ 한국, 대만, 일본 등 3국이 학술정보교환 및 국제교류를 목적으로 매년 국가별 순회 개최하는 행사로 전주이미지 홍보에 크게 기여

○ 주    관 : 대한국토도시계획학회

○ 사 업 비 : 15백만원

□ 추진상황

○ 주관기관 사업제안서 접수 : ’08. 8.13

○ 보조금 교부              : ’08. 8.18

○ 전주 아트폴리스 홍보 및 인적 네트워크 구축

○ 보조금 정산․심사        : ’08.10.30

2008 대한민국 공공디자인엑스포 참가

○ 공공디자인 관련 우수사례 발굴 및 공유를 통하여 전주 아트

폴리스를 대내외로 홍보하고

○ 전주아트폴리스에 대한 관심제고 및 시민공감대 형성

□ 사업개요

○ 전시개요

- 명    칭 : 2008 대한민국 공공디자인엑스포(Public Design Expo 2008)

- 주    제 : “아름다운 공간, 따뜻한 도시”

- 일    시 : ’08.10.28(화) ~ 11. 1(토)

- 장    소 : 서울 코엑스

- 주최‧주관 : 문화체육관광부, 대한민국 공공디자인엑스포 조직위원회

○ 전주시 참가개요

- 부스신청 : 6부스(54㎡, 1부스당 3×3=9㎡)

- 소요예산 : 80백만원(참가비 15, 부스설치․운영 65)

□ 추진상황

○ 참가계획 수립 : ’08. 7. 3

○ 관련부서 협의(홍보담당관실, 한스타일과) : 7. 9

○ 참가 컨셉 구성 및 설정 : 7.10까지

○ 주관대행사 선정        : ’08. 7.14 ~  8.18

○ 부스 시뮬레이션        : ’08. 8.21 ~ 10.15

○ 2008 대한민국 공공디자인 엑스포 참가 : ’08.10.28~11. 1

□ 추진성과

○ 2008 대한민국 공공디자인대상(주거환경분야) 우수상 수상

○ 전주관 운영을 통해 대․내외에 아트폴리스 정책 홍보

- 아트폴리스 현장 탐방(직원 등 40여명)	: ’08.10.28

○ 엑스포 참여 평가 보고서 작성 및 환류	: ’08.11월중

Good Sign Festival 전시행사 참가

○ 한옥마을 간판 정비사업 및 우리시 간판 가이드라인 등에 대해 타시도와 성공사례 비교분석을 통하여 발전방향을 모색하고

○ 전주 아트폴리스 프로젝트 홍보를 통해 관계부처의 관심 제고와 유대관계를 형성하여 향후 국비확보 등 원활한 사업추진 도모

□ 사업개요

○ 명    칭 : KOSIGN 2008 / GOOD SIGN FESTIVAL

○ 일    정 : ’08.11. 6 ~ 11. 9(4일간)

○ 장    소 : 서울 삼성동 코엑스 1층 전시장(인도양․태평양홀)

○ 행사내용 : 개막행사, 컨퍼런스, 전시관 운영

※ 전라북도 참가신청 지자체 : 전주시, 남원시

(’06~’07 행정안전부 간판시범거리 조성사업 특별교부세 지원 시군)

○ 사 업 비 : 50백만원

○ 주    최 : 행정안전부, 한국옥외광고협회, 코엑스

※ 우리시 참가내용

∘한옥마을 간판 정비사업, 아름다운 간판디자인 및 시스템 개발

∘아트폴리스 프로젝트 홍보 등

□ 추진상황

○ 행사관련 홍보관 설치․운영에 따른 위탁 시행	: ’08. 9. 2

- 위탁계약 : 한국지방재정공제회(옥외광고센터)

○ Good Sign Festival 제안서 평가	: ’08.10. 8

○ 대행사 선정(서울신문사,엔쓰리디엔티,일레븐스타)	: ’08.10.15

○ 행사준비사항 안내 및 부스배정	: ’08.10.16

○ 관련자료 송부 및 콘텐츠 세부안 확정 : ’08.10.17~10.31

○ Good Sign Festival 참가          : ’08.11. 6~11. 9

□ 금후계획

○ 행사 참여 평가보고서 작성 및 환류 : ’08.11월말까지

생태복원과 소관

ꊱ	친수광장 조성사업	---------------------					25
ꊲ	전주시 물관리 종합대책 수립 용역				--------		26
ꊳ	노송천 복원 프로젝트		-------------------				27
ꊴ	만경강 생태하천 가꾸기 사업			------------			28
ꊵ	아중천 생태하천조성 및 준설사업					-------	29
ꊶ	건산천 기본계획 및 실시설계 용역				--------		30
ꊷ	만경강 수계치수 중복천 개수공사				--------		31

□ 2008년 주요성과

○『천년전주 혈맥 잇기』일환으로 복개된 노송천을 자연형 하천으로 복원하기 위한 프로젝트 추진

- 중앙부처 설계검토 및 자연형 하천정화 심의

- 기본(종합) 및 실시설계용역완료, 공사착공, 책임감리용역 착수

- 기공식, 브로셔 배포, 홍보영상물 상영 등 다각적인 홍보

- 유지용수 관로매설(1.9㎞), 오․우수분리 0.9㎞

- 기존박스 준설(2,100㎥), 아중저수지 안전진단 등

○ 도심내 주요광장을 물과 도시가 어우러지는 친수공간 조성 추진

- 화산체육관 앞(벽천) 조성공사 완료

- 3개소 실시설계 용역(화산체육관 광장, 홈플러스 사거리, 롯데백화점 앞)

○ 하천과 사람이 공존할 수 있는 생태하천 조성사업 추진

- 만경강, 아중천, 중복천 등

⇒ 산책로조성, 조경석 쌓기, 어도설치, 습지 및 수생식물 식재 등

⇒ 아중천 산책로 조성 개통(’08.6) 및 건산천 실시설계용역 완료

○ 전주시 물관리 종합대책 수립을 위한 연구용역 착수

□ 2009년 중점 운영방향

○ 노송천 복원 프로젝트 본격 추진으로 천년전주의 혈맥을 이어

맑은 물이 흐르고 자연과 어우러진 수변공간 조성을 통해 시민

삶의 질 향상과 중앙시장을 비롯한 구도심 상권의 활성화 기여

- 중앙시장 바보신발～구 한양예식장(L=200m) : ’09.3월까지 완료

- 구)한양예식장~한국은행(L=494m) : ’10.5월까지 완료

○ 특성화된 분수와 휴게시설 등 친수공간 조성으로 생태도시 활성화

- 화산체육관 광장 등 3개소 공사 추진

○ 쾌적한 산책길 및 휴식공간을 제공하기 위한 자연형 생태하천 조성 추진

- 만경강, 아중천, 중복천 등 연차적 추진

⇒ 호안, 산책로, 습지조성, 수생식물 식재 등 생태하천 조성

○ 전주시 물관리 종합대책 수립을 위한 연구용역 추진

- 수질개선대책, 용수확보방안, 하천환경관리방안 등

(전주천,노송천,건산천,아중천,덕진공원 등)

친수광장 조성사업

○ 도심권내 8개 주요광장을 특성화된 분수와 휴게시설 등 친수공간 조성

○ 아름다운 가로경관 및 시민휴식공간 제공으로 생태도시 활성화

□ 사업개요

○ 위    치 : 8개소(화산체육관 광장, 롯데백화점 앞, 홈플러스 앞,  비사벌@ 앞, 안덕원사거리, 서곡사거리, 금암로터리, 한국은행 앞)

○ 사업내용 : 분수시설 및 조경, 휴식시설 설치

○ 총사업비 : 10,500백만원

- ’07~’08예산 : 1,810백만원(’07년 1,050, ’08년 760 - 도400, 시360)

○ 사업기간 : 2007 ~ 2010(4개년)

□ 추진상황

○ 기본계획 용역과제 심의 완료              : ’06. 10

○ 기본계획(8개소) 및 실시설계(1개소) 용역추진  : ’07. 4～’08. 4

○ 화산체육관 앞(벽천) 조성공사 준공        : ’08. 8

○ 실시설계 용역 착수(3개소)	: ’08. 9

□ 금후계획

○ 실시설계 용역완료(3개소)                 : ’08.12

- 롯데백화점 앞, 홈플러스 앞, 화산체육관 광장

○ 롯데백화점 앞(600백만원) 사업추진       : ’08.12～’09.5

○ 홈플러스 앞(825백만원), 화산체육관 광장(1,690백만원) 사업추진 : ’09. 1 ～ 6

○ 송천동 비사벌 아파트 앞 등 3개소 실시설계용역 : ’09. 1 ～ 6

○ 전체 사업완료                            : ’10.12

전주시 물관리 종합대책 수립 용역

○ 전주시가 안고 있는 물관리 전반에 대한 물 마스터플랜 수립

○ 수원․수질․하천환경․하수재처리 등의 개선으로 시민의 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 용 역 명 : 전주시 물관리 종합대책 수립 연구용역

○ 용 역 비 : 200백만원

○ 용역기간 : 계약일로부터 12개월

○ 과업범위 : 전주시 전역

○ 내    용 : 전주시 수원확보, 수질개선, 하천환경관리, 하수재처리

활용 등 물관리 전반 종합대책 수립 방안 제시

□ 추진상황

○ 환경단체 및 전문가 의견 수렴                 : ’08. 7

○ 물관리 종합대책 T/F팀 구성                  : ’08. 7

○ 물관리 종합대책 연구용역 과업지시서(안) 작성    : ’08. 8

○ 용역 심의 및 일상감사                        : ’08. 8

○ 계약심의위원회 심의                          : ’08.10

○ 용역 계약 및 착수                            : ’08.11

□ 금후계획

○ 용역 완료                                   : ’09.11

노송천 복원 프로젝트

○ 노송천에 맑은 물을 흐르게 하여 자연과 어우러진 수변공간 제공

○ 특색 있는 거리조성으로 삶의 질 향상과 구도심 활성화 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 코아 앞 바보신발～진북동 한국은행 간

○ 사 업 량 : 하천복원 L=694m, B=15～25m

○ 사 업 비 : 269억원(국비169, 지방비93, 기금7)

○ 사업기간 : 2007～2010(4개년)

□ 추진상황

○ 노송천복원 민․관협의회 구성 및 운영(6회)	: ’07. 4

○ 중앙부처 재원협의 및 설계검토 완료	: ’08. 2

○ 도시계획시설(도로) 결정(변경)	: ’08. 4

○ 공사착공 및 책임감리용역 착수	: ’08. 6

○ 기공식	: ’08. 9

※ 공사분야 추진실적(추진공정16%)

- 유지용수 관로매설1.9㎞, 차집관로 등 오․우수분리0.9㎞

기존박스 준설 2,100㎥, 아중저수지 안전진단 등

□ 금후계획

○ 아중저수지 관련사업 시행(농촌공사, 24억원) : ’08.11~’09.2

- 가동보1식, 저수지준설(135천㎥), 제방보강1식

○ 1차구간 완료(코아앞 바보신발~구 한양예식장:200m) : ’09. 3

○ 잔여구간 완료(구 한양예식장~한국은행 앞: 494m) : ’10. 5

만경강 생태하천 가꾸기 사업

○ 오염된 전주천 하류의 수질개선 및 하천생태계 복원

○ 전주천, 삼천과 더불어 시민에게 쾌적한 휴식공간 제공

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 팔복동 추천대교～만경강 합류부

○ 사업규모 : L=7.9km(전주천5.7, 만경강2.2)

○ 사업내용 : 조경석쌓기 3.2km, 탐방로 13.9km, 수제15개소,

운동시설 8개소, 습지조성 1개소, 생태수로 660m,

어도 2개소, 수생식물 식재 등

○ 총사업비 : 16,637백만원(국10,772  도598  시5,267)

- ’08까지 : 10,170백만원(’07년까지7,390  ’08년2,780)

※ ’09년도 예산 : 825백만원(국400  시425)

○ 사업기간 : 2001～2010(10년간)

□ 추진상황(전체공정 61%)

○ 기본계획 연구 및 기본설계                      : ’01. 4

○ 1~4차 공사완료(’04～’07) : 조경석쌓기3.2km, 탐방로 11km, 수제 15개소, 운동시설 8개소, 수생식물 식재 등

○ 2008년분 공사착수(현 공정 75%)              : ’08. 5

○ 사업계획 변경 사전협의(환경부)                 : ’08. 7

- 하중도 조성(3개소) ⇒ 습지조성 1개소, 생태수로 660m

- 탐방로 조성 ⇒ 추가 신설 1.5㎞(경작금지로 수질오염예방)

○ 변경사항 환경부 협의 완료                     : ’08.10

□ 금후계획

○ 2008년 공사추진 완료                          : ’08.12

- 탐방로 1.4㎞, 습지조성 1개소, 수생식물식재, 어도2개소 등

○ 2009년 이후 : 탐방로 1.5km, 생태수로 660m, 수생식물식재 등

아중천 생태하천조성 및 준설사업

○ 도심하천인 아중천에 대하여 수질개선 및 하천정비 시행

○ 재해사전예방 및 생태하천 복원으로 시민 휴식공간 제공

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 우아동 아중리 복개종점～소양천합류부

○ 사업규모 : L=2.88㎞

○ 사업내용 : 교량 2기, 호안공4.8㎞, 취입보6개소, 산책로5.4㎞, 운동시설, 수생식물식재 등

○ 총사업비 : 5,725백만원(국3,436  도1,145  시1,144)

- ’08까지 : 3,997백만원(’07년까지2,330,  ’08년1,667)

※’09년도 예산 : 1,726백만원 (국1,036   도345   시345)

○ 사업기간 : 2004～2009(6개년)

□ 추진상황(전체공정 70%)

○ 총괄공사 계약 및 1차분 공사착공	: ’06. 9

○ 1～2차분 공사완료	: ’07. 9～’08. 2

- 교량 2기, 호안공 2.2㎞, 취입보 1개소

○ 2008년분 공사착수(현 공정 90%)	: ’08. 1.

- 산책로조성(2.5㎞) 개통 및 운동시설 설치완료(’08.6.10)

※ 우아교에서 소양천간 산책로연계를 위한 국가예산 반영요구(5억)

□ 금후계획

○ 2008년분 공사추진 완료 : ’08.12

- 호안공 2.1㎞, 수생식물 식재 등

○ 2009년 : 호안공 0.5㎞, 취입보 5개소, 산책로 2.9㎞, 수생식물 식재 등

건산천 기본계획 및 실시설계 용역

○ 자연과 인간이 공존 가능한 친환경 생활공간 조성계획 수립

○ 자연성을 살린 생태하천복원을 통한 시민들의 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 금암동. 진북동 일원

○ 과업개요 : 기본계획 L=1.25㎞(기린로~전주천합류부)

실시설계 L=0.87㎞(복개종점~전주천합류부)

○ 용 역 비 : 148백만원

○ 용역기간 : ’07. 6 ～ ’08.11월

□ 추진상황(완료)

○ 기본계획 주민설명회 및 환경성검토 협의     : ’08. 3.～4.

○ 실시설계 생태하천협의회 자문               : ’08. 5.

○ 하천기본계획 고시                          : ’08. 6.

○ 실시설계 아트폴리스추진위원회 자문         : ’08. 6.

○ 의회 간담회(도시건설위)                    : ’08. 7.

○ 실시설계 주민설명회(진북동, 금암동)        : ’08.11.

○ 기본 및 실시설계용역 완료                  : ’08.11.

□ 금후계획

○ 건산천 조성사업은 노송천 복원 후 2010년부터 사업추진

만경강 수계치수 중복천 개수공사

○ 익산지방국토관리청 만경강 수계치수 사업으로 선정 위ㆍ수탁 추진

○ 재해예방과 친환경 생태하천으로 조성 시민휴식공간 제공

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 삼천동 쑥고개길～효자동 삼천합류점

○ 사업규모 : 용지매입 및 하천개수 L=3.5㎞

○ 사업내용 : 교량10개소, 축제 5.7㎞, 배수문 8개소, 취입보 3개소

○ 총사업비 : 32,000백만원(국비)

- ’08까지 : 8,764백만원(’07년까지7,343   ’08년1,421)

※’09년도 예산 : 8,619백만원(보상5,819  공사2,500  감리300)

○ 사업기간 : 2004～2010(7개년)

□ 추진상황(전체공정 28%)

○ 위․수탁공사 협약 체결(익산청⇔전주시)	: ’03. 6

○ 1～2차분공사완료(교량1개소 축제5.7㎞)	: ’05.10～’07.12

○ 2008년분 공사착수	: ’08. 5

- 토지 및 지장물 보상협의, 지장물 철거

○ 효자2교 민원관련 공사전구간 기본계획변경 검토 : ’08.5～9

- 익산청 및 전북도(하천기본계획변경 필요) 사전협의

○ 하천기본계획변경 협의완료(익산청) 및 변경착수 : ’08.10

□ 금후계획

○ 사전환경성검토 관련 전문가자문 및 주민공람    : ’08.12

○ 하천 기본계획변경 완료                         : ’09. 3

○ 사업추진 재개                                 : ’09. 4

○ 사업완료                                      : ’10.12

푸른도시조성과 소관

ꊱ	도시 숲 조성사업	------------------------														34
	①도시․학교숲 조성사업				------------------											36
ꊲ	삼천상류 산책로변 녹음수 식수											---------				37
ꊳ	전주시 공원녹지 기본계획 수립										----------					38
ꊴ	나들목 가족공원 진출․입도로 개설공사														-----	39
ꊵ	꽃도시(꽃벽 및 조형화분 등) 조성사업												--------			40
ꊶ	공원 시설물․공원등 설치 및 보수								-----------							41
ꊷ	건지산 편의시설 보수 및 신설							-----------								42
	송천 유적공원 화장실 신축 공사											---------				43
	완산생활체육공원 조성사업						--------------									44
	전주족구장 조성사업		--------------------													45
	완산공원 꽃동산 조성사업					---------------										46
	기린공원 치명자산 산책로 정비									-----------						47
	아중리 체련공원 휴식공간 조성사업													------		48
	오목대 절개지 정비공사					---------------										49
	보호수 및 노거수 정비사업						--------------									50
	학산 등산로 정비사업			-------------------												51

□ 2008년 주요성과

○ 푸른 도시로 도약하기 위한 그린네트워크 구축과 도심의 특색 및 기능을 고려한 도시숲 조성으로 쾌적한 생활환경을 확충(’07～’10/160억원)

○ 제2차년도인 ’08년에는 그린터널 조성사업 등 8개 사업에 40억원을 투입하여 11월 현재 아름다운 녹화거리 조성사업 등 7개 사업을 완료하였고, 1개 사업은 12월중 완료할 예정임.

○ 또한, 자연 친화적인 푸른 녹지공간 조성 및 도심 가로망과 연계된 아름다운 녹색공간 확충 및  꽃도시 조성을 위한 꽃묘 자체생산 공급 확대

○ 다양하고 개성 있는 웰빙공원 조성으로 문화여가 공간 저변 확대

○ 우리시 녹지관리 분야의 조성 및 관리에 대한 녹지체계의 근간이 될 수 있는 공원녹지의 중장기적인 기본계획이 마무리 단계

□ 2009년 운영방향

○ 삶의 도시공간을 새롭게 디자인할 생태도시 기반을 구축할 종합마스터 플랜인 공원녹지 기본계획을 근간으로 도시공간을 종합적으로 디자인 할 수 있는 중장기적인 쾌적한 미래도시 건설 기반 마련

○ 도심의 특색 및 기능을 고려한 도시 숲 조성 사업인 도시‧학교숲 조성사업을 마무리 하여 쾌적한 생활공간 개선

○ 우리시 여건에 맞는 녹지시설물 종합 관리지침에 의거 효율적이고 체계적인 수목유지관리에 최선을 다하겠음

○ 등산로 정비, 공원조성 등 편익시설 설치와 도심 생태기능의 종합적인 녹지공원 조성‧관리를 통해 산불방지 및 산림자원 보호 육성대책을 마련해 나가겠음

도시 숲 조성사업

○ 도심내 교통섬, 공한지, 가로변, 학교 등에 숲 조성으로 친환경적인

시민 휴식공간 제공

○ 녹지대를 연계한 Green network 구축으로 생활환경 개선 및

도시생태계 기능 강화

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 도심일원

○ 사업규모 : 300만 그루 (공공식재 232, 민간식재 68)

○ 총사업비 : 16,000백만원

○ 사업내용 : 11개 사업

- 그린터널, 도시․학교숲, 종합가족휴양공원, 담장 없애기

○ 사업기간 : 2007 ~ 2010년(4개년)

□ 추진상황

○『천년전주 푸른도시 가꾸기』자문위원 회의 : ’08. 1.23

- 사업별 계획보고 및 대상지 우선순위 결정과 수종 선정 등

○ 천년전주 푸른도시 가꾸기 자문위원 자문 및 사업계획서 검토(6회)

○ ’08년 사업 추진

- 위    치 : 전주시 도심일원(가로변, 교통섬, 공한지, 학교 등)

- 사 업 비 : 4,000백만원(균특2,000, 도비400, 시비1,600)

- 사업내용 : 8개 사업

ㆍ완  료 : 7개 사업(아름다운 녹화거리, 담장 없애기 등)

ㆍ추진중 : 1개 사업(도시․학교숲)

□ 문제점 및 대책

○ 도심 중심부에 가시적인 효과를 거둘 수 있는 식재 대상지가 한정되어 추진이 어려움

⇨ 주요 도로변 및 전주 진입로변을 주 사업대상지로 선정하여 가시적인 효과 거양

○ 각종 나무심기사업으로 도심녹지의 양은 대폭 증가 하고 있으나, 관리인력 및 예산 부족으로 유지관리 어려움

⇨ 효율적인 유지관리를 위한 DB구축 및 예산․인력 지원 필수

□ 금후계획

○ ’08년 사업 마무리 및 ’09년 대상지 조사

- 도시․학교숲 조성사업

○ 2008년 도시 숲 조성사업 세부현황

사 업 명	사 업 량	사업비(백만원)				비고
		계	국비	도비	시비
합 계		4,000	2,000	400	1,600
그린터널 조성사업	우전로, 2.8km	1,050	525	105	420	완료
도시벽면 녹화사업	안덕원길, 문화로 등 5개 노선, 573m	150	75	15	60	완료
아름다운 녹화거리 조성사업	명주길, 월드컵로 등 4개 노선	500	250	50	200	완료
담장없애기사업	전주초 1개소	100	50	10	40	완료
천년숲 마을마당 조성사업	팔복동 팔과정, 전미동 월평마을 2개소	100	50	10	40	완료
도시공원 녹화사업	거마공원, 삼천소공원 2개소	150	75	15	60	완료
작은문화복지공간조성사업	마당재 1개소	650	325	65	260	완료
도시․학교숲 조성사업	통일광장, 휴비스, 용흥중, 아중중등 5개소	1,300	650	130	520	추진중

① 도시․학교숲 조성사업

○ 도심내 교통섬, 공한지, 학교 등 숲 조성으로 친환경적인 시민휴식 공간 제공

○ 자연의 조화와 생명의 소중함을 인식할 수 있는 교육의 장 제공

○ 녹지와 연계한 Green network 구축으로 생활환경 개선 및

도시 생태계 기능 강화

□ 사업개요

○ 위    치 : 도심내 공한지, 교통섬, 학교 등

○ 사업규모 : 40개소

○ 총사업비 : 5,200백만원

○ 사업내용 : 교통섬, 도심 공한지, 학교 등에 숲 조성 및 휴식공간 조성

○ 사업기간 : 2007 ～ 2010년

□ 추진상황

○ ’08년 사업추진

- 위    치 : 통일광장, 휴비스, 공고사거리 교통섬, 용흥중, 아중중 등

- 사업규모 : 5개소

․수목식재 : 26,432그루(소나무 등 13종)

․시 설 물 : 화강석 의자 등 2종

- 사 업 비 : 1,300백만원

- 사업기간 : ’08. 5.15 ～ ’09. 1.16

○ 사업진척 : 50%

□ 문제점 및 대책

○ 도심 중심부 대로변을 중심으로 가시적인 효과를 거둘 수 있는

식재 대상지가 부족

⇨ 도로와 접한 공원 등 리모델링을 통하여 소나무 대목을

식재하고, 공한지, 학교숲 대상지를 발굴 식재토록 하겠음

□ 금후계획

○ ’08년 사업 지속 추진 : ’09. 1.16

삼천상류 산책로변 녹음수 식재

삼천 제방을 이용 산책과 운동을 하는 시민들에게 쾌적한 녹색

웰빙 환경을 제공하기 위하여 녹음 수목 식재 필요

□ 사업개요

○ 위    치 : 삼천 산책로(추천대교～삼천교～신평교)

○ 규    모 : 1개소 1.3km(왕복 2.6km)

○ 사 업 비 : 200백만원

○ 사업내용 : 산책로변 쉼터에 수목식재로 그늘 만들기

삼천교～신평교간 제방 가로수 식재

○ 사업기간 : ’08. 11 ～ 12월

□ 추진현황

○ 실시설계 용역 착수((주)예일엔지니어링 정희숙) : ’08. 8. 4

○ 실시설계(안) 중간보고	: ’08. 8.27

○ 한국건설기술연구원에 수리계산서 검토 의뢰 : ’08. 9.26

⇨ 수리계산서 보완 후 재의뢰 요구	: ’08.10.29

○ 수리계산서 검토 재의뢰(한국건설기술연구원)  : ’08.11.14

□ 금후계획

○ 준    공 : ’08.12.31

전주시 공원녹지기본계획 수립

○ 전주시의 공원 및 녹지, 가로수 등을 중심으로 시 전체의

중장기적인 녹지체계의 근간 마련

○ 시민생활 환경 개선, 도시생태기능 강화 및 도심 가로경관향상 등

종합적인 공원녹지 조성과 관리․이용 방향 수립

□ 사업개요

○ 용 역 명 : 전주시 공원녹지기본계획 용역

○ 용역기간 및 용역비 : ’07.3.19 ~ ’08.10.18 / 190백만원

○ 용역기관 : 전북대학교 부속 농업과학기술연구소

○ 과업의 범위

- 시간적 범위 : 단기 년도(2010년), 중기(2020년), 장기(2030년)

- 공간적 범위 : 전주시 전 지역

- 내용적 범위 : 공원녹지의 종합적 배치에 관한 사항,

공원녹지의 보전․관리․이용에 관한 사항 등

□ 추진상황

○ 중간보고회(4회)         : ’07. 7.19 ～ ’08. 2.25

○ 공  청  회              : ’08. 3.26 / 4층 회의실

○ 도시공원위원회 자문     : ’08. 4. 3 / 영상회의실

○ 도시건설위원회 간담회(2회) 및 안건심사(’08. 5.21)

○ 제253회 본의회 안건 처리(유보)	: ’08. 5.23

○ 용역사에 안건처리 결과 및 일정 통보 : ’08. 6. 2

○ 제253회 임시회에서 유보된 의견청취안 안건 철회 : ’08. 7.24

○ 용역보고서(안) 보완 및 검토         : ’08.7.29 ~ 8.20

○ 도시건설위원회 간담회	: ’08. 8.28

○ 제257회 임시회 도시건설위원회 안건심사 : ’08. 9. 8(원안채택)

○ 제257회 4차 본회의 안건 처리 결과    : ’08. 9.11(원안채택)

○ 도시계획위원회(전라북도) 자문 의뢰  : ’08.11.12

□ 금후계획

○ 전주시 공원녹지기본계획 승인 신청(국토해양부) : ’08.12

나들목 가족공원 진출‧입도로 개설공사

○ 북부권 구 나들목 주변의 가족휴양공원 조성으로 시민정서 함양 기여

○ 고속도로 나들목을 이용하는 시민들의 만남의 공원 이용 편익 제공

○ 종합가족휴양공원의 진ㆍ출입 도로 개설로 공원 이용객 교통편익 제고

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 용정동 나들목 가족공원

○ 공사개요 : 도로개설 L=282m, 인도개설 L=125m

○ 공 사 비 : 276백만원

○ 공사기간 : 2008.11 ~ 12월

□ 추진상황

○ 진입로 편입 CBS전북방송 토지 교환계약	: ’07.10.12

○ 나들목 가족공원 조성사업 완료(1,013백만원) : ’08. 3. 2

○ 도시공원 조성계획수립과 도로실시설계 용역완료 : ’08.10.23

○ 공사착공	: ’08.11. 7

○ 도시공원 조성계획 도시계획시설결정 행정절차 이행	: ’08.11.20

○ 도로공사 소유토지 도시공원 결정에 따른 사전협의	: ’08.11.20

□ 금후계획

○ 진입로에 편입된 CBS소유 토지와 공유지 교환 등기	: ’08.12

○ 도로개설 공사추진 및 완료	: ’08.12.31

꽃도시(꽃벽 및 조형화분 등) 조성사업

○ 시민 이동이 많은 삭막한 콘크리트 구조물인 교량 난간에 꽃벽과

주요 도로에 특색 있는 화분 설치로

○ 주변 환경과 어우러진 아름답고 화려한 도시경관을 창출하고

○ 각종 문화행사시 축제분위기 조성으로 행사의 성공적 개최에 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 도심지역 주요로선, 교량 등

○ 사업규모 : 5개소(도로 1, 교량 4)

○ 사 업 비 : 170백만원

○ 사업내용

- 도로 : 고리형 화분(FRP/94개) 꽃묘 식재

- 교량 : 꽃벽 설치〔 L=692m(추천대교 620m, 진덕교 72m)〕

○ 사업기간 : ’08. 4 ~ 11월

□ 추진상황

○ 꽃벽설치 : 1,163개(난간걸이 화분 및 자동관수시설 등)

- 식재화종 : 2종 13,142본(웨이브페츄니아 13,058, 임파첸스 84)

○ 태조로 화분 설치 및 관리

- 화분배치 : 138개 고리형 화분(FRP) 94개, 조형화분 44개〕

- 식재화종 : 3종 3,200본 (무늬비비추 외 2종, 3회)

- 조형화분 : 수생식물 급수 관리 및 부유물질 제거(주1회)

- 고리형화분 : 생육상태 유지를 위한 시비, 제초, 관수실시(수시)

○ 꽃벽유지관리 : 4개소 1,208m(’07설치 2개소, ’08설치 2개소)

- 화종교체 식재 : 웨이브페츄니아 24천본 정도

○ 겨울 꽃 (꽃배추) 식재 : ’08.11.13

- 수량 : 5,062본(교량 : 4,362본, 화분 700본) 정도

공원 시설물･공원등 설치 및 보수

○ 등산로 이정표･안내판을 새롭게 정비하고 노후 등기구의 정비

및 공원등의 조도를 높여 시민 불편을 해소함은 물론

○ 공원노후시설 정비 및 테마공원 조성으로 공원이용성 제고

□ 사업개요

○ 위    치 : 관내 13개 공원

- 황방산, 완산, 화산, 기린, 건지산, 안행, 황산, 금암, 느티나무,

새터, 양지쯤, 서일, 효열 공원

○ 사업규모

- 황방산 등 2개 공원 등산로 시설공사(황방산, 완산, 화산공원)

- 기린공원 외 5개소 공원등 설치공사(건지산, 기린, 안행, 황산,

금암, 느티나무공원)

- 새터 외 3개 공원 운동시설 공사(새터, 양지뜸, 효열, 서일공원)

○ 총사업비 : 440백만원(시설물 360, 가로등 80)-도비115

○ 사업기간 : ’08. 3 ～ 12월

□ 추진상황

○ 공원시설물 정비 예산 재배정 : 100백만원 / 양구청 각50백만원

○ 황방산 외 2개공원 등산로 시설공사(70백만원) : ’08.4.29 ~ 7.10

- 이정표 48개소, 방부목 계단 892단

○ 건지산외 6개소 공원등 설치공사(80백만원)	: ’08. 4.30 ~ 8. 4

- 공원등 22등, 제어반 5개소, 관로매설 871m, 콘트롤 교체 8개소

○ 산악 안내판 설치 및 수목이식(20백만원)  : ’08.10

□ 금후계획

○ 새터 외 3개 공원 운동시설 공사 (150백만원) : ’08.12.20

건지산 편의시설 보수 및 설치

○ 덕진공원 건지산을 덕진, 송천, 금암 권역 지역주민의 건강

증진의 웰빙공간으로 조성

○ 편백림 숲 등 양호한 숲 공간에 산림욕을 위한 편의시설 설치로

산림훼손 방지 및 이용편익 제공

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 덕진공원 건지산 일원

○ 사업규모 : 장덕사~소리문화 전당 산책로 정비(L= 680m)

대지마을~오송제간 산책로 정비(L=200m)

대학병원 뒤 산책로 정비(L= 800m)

○ 사업내용 : 등산로 자갈부설 및 배수로 정비

운동․휴게시설(의자) 보수 및 설치

수목 이식(삼각단풍) 및 초화류 식재

편백림숲 산림욕을 위한 편의시설 설치

○ 사 업 비 : 126백만원

○ 사업기간 : ’08.10. 9 〜 12.20

□ 추진상황

○ 건지산 편의시설 설치 및 보수공사 실시설계 용역완료(’08.7.10)

○ 설계 자문 완료(전북대학교 이명우 교수)

○ 전북대학교측과 협의                : ’08. 6.13

○ 시의원 및 환경단체 전문가 현장자문 : ’08. 8.30

○ 공사 착공                          : ’08.10. 9

□ 금후계획

○ 공사 완공 (현재 공정 30%)        : ’08.12.20

송천 유적공원 화장실 신축 공사

송천 유적공원내에 깨끗하고 아름다운 공중 화장실을 신축하여

공원 이용객의 편익을 도모하고자 함

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 송천유적공원 내

○ 사업규모 : 부지면적 54㎡, 건축면적 36㎡

○ 사업내용 : 공중화장실 신축

○ 사 업 비 : 100백만원

○ 사업기간 : ’08.10. 1 ～ 12.31

□ 추진상황

○ 실시설계 (7,000천원)	: ’08. 3.24 ~ 9. 1

○ 아트폴리스위원회 자문	: ’08. 5. 5 ~ 5.30

- 건축 전문교수 개별적 디자인 자문

- 유적공원의 이미지 부각, 채광, 규모, 내외장재 등 검토

○ 공원조성계획 변경 결정	: ’08. 9.26

○ 사업발주 및 착공	: ’08.10. 1

□ 금후계획

○ 사업완공 (현재공정 50%)	: ’08.12.31

완산생활체육공원 조성사업

시민의 생활체육 활성화를 위한 체육시설 확충으로 건강증진

및 정서함양에 기여 지역간 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 중인동 모악산 인접 어두제 일대

○ 사업규모 : 147천㎡(축구, 테니스장 등 6종 31개 체육시설)

○ 총사업비 : 190억원(국비 14, 도비 8, 시비 168)

○ 사업기간 : 2001 〜 2008년(8개년)

□ 추진상황

○ 편입토지 보상 : 126천㎡ 5,600백만원(완료)

○ 공사(토목, 건축, 기계) : 8,858백만원

- 축구장(1면), 주차장(537대), 테니스장(16면), 게이트볼장(6면) : ’04〜’06

- 농구(2면), 배구(2면), 배드민턴(3면), 관리사 및 화장실 등 : ’07년

- 내부 마무리 공사 및 진입로 포장공사 완료	: ’08년

○ 부대공사

- 조경 및 문화유적 보존공사 : 1,679백만원(’07.7~’08.7)

- 용역, 문화재발굴, 전기 및 통신, 대체농지조성비 등 : 2,863백만원

○ 체육시설 임시개장 운영                    : ’08. 4. 5

○ 시설물 관리․운영 인수 인계(시설관리공단) : ’08. 7.30

○ 전체공사 준공                             : ’08. 8.21

□ 금후계획

○ 개발부담금 산정 및 농지전용 부담금(11억) 납부 : ’08.12

전주 족구장 조성사업

현대적 시설의 족구경기장 조성으로 족구동호인의 저변확대와

시민생활체육 기반을 구축하고자 함

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 중인동 384번지일원(완산생활체육공원 지내)

○ 사업규모 : 면적13천㎡, 족구장 5면, 관람석 2,000석, 편익시설 1식

○ 사 업 비 : 1,000백만원(국비500, 시비500)

○ 사업기간 : ’07.12 〜 ’08.10

□ 추진상황

○ 예산확보 : 문광부(생활체육과), 국민체육진흥공단

- 예산지원협약(’06.10) : 국비 5억원(국민체육공단 ↔ 전주시)

- 예산확보액 : 1,000백만원(국비 500, 시비 500)

○ 설 계 용 역	: ’07. 4 〜 11

○ 공 사 착 수	: ’07.12.21

○ 공 사 준 공	: ’08.10.30

○ 시설물 인수인계 : ’08.11.14

완산공원 꽃동산 조성사업

○ 도시민의 근린 휴양시설 확충으로 시민 여가활동 공간 제공

○ 기린봉, 남고산성, 오목대, 한옥마을과 연계한 도심권 관광지 조성

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 완산구 동완산동 산3-7번지선(완산도서관 부근)

○ 규    모 : 면적 34천㎡ 산책로(B=2m, L=1km)

(공유지:21필지8천㎡, 사유지:14필지 26천㎡)

○ 사 업 비 : 1,500백만원 (보상비 1,037, 공사비 420, 용역43)

- 2008년 1회 추경예산 확보 : 500백만원

○ 사업기간 : ’08. 7 〜 ’09.12월

□ 추진상황

○ 관계인 현지답사 및 의견조율(시, 시의원 등)	: ’07.4～’08.6

○ 지방재정 투․융자 심사완료	: ’08. 6. 4

○ 공원조성계획변경 및 실시설계용역 완료(43백만원)	: ’08.10.27

○ 공원조성변경계획 변경 주민의견수렴 공람공고	: ’08.11.14

□ 금후계획

○ 토지 및 지장물 보상 협의 (450백만원)	: ’08.12

○ 2009년 예산확보(10억) 사업추진	: ’09. 3 ~ 12

기린공원 치명자산 산책로 정비

○ 천주교 성지 치명자산의 산책로 정비로 참배객 이용편의 제공

○ 전국적인 관광 명소로 조성하여 지역 주민의 자긍심 고취

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 완산구 대성동 기린공원(치명자산)

○ 규    모 : 산책로 1,500m

- 철평석 및 돌 계단포장 : 458㎡, 파고라 3동, 평의자 33, 부대공 1식

○ 사 업 비 : 200백만원(도비)

○ 사업기간 : ’08. 6 〜 12월

□ 추진상황

○ 추경예산 성립전 사용승인	: ’08. 5.20

○ 산책로정비 실시설계용역(8,500천원)	: ’08. 6.10 ~ 7.30

○ 공사발주 및 착공 (167백만원)	: ’08. 9.25

□ 금후계획

○ 공사완공 (현재 공정 70%)	: ’08.12.30

기린공원 아중체련시설 휴식공간 조성사업

체련공원을 찾는 이용객들에게 폭염 또는 우천시 대피 할 수

있는 정자를 설치하여 편히 쉴 수 있는 휴식공간 조성

□ 사업개요

○ 위    치 : 인후동1가 1003번지 기린공원 아중체련시설 내

○ 규    모 : 팔각정자 1동, 부대공 1식

○ 사 업 비 : 100백만원(추경예산)

○ 사업기간 : ’08.10 ~ 12

□ 추진상황

○ 팔각정자 설치 예정지답사 및 지역구 의원협의 : ’07. 2.28

○ 주민의견수렴 공청회 개최(시의원, 주민자치위원 등) : ’07. 3. 9

○ 기린봉에서 아중 체련공원으로 위치변경(시의회) : ’08. 6

○ 실시설계 완료	: ’08. 8 ~ 10

○ 공사입찰       : ’08.10.31

○ 공사착공       : ’08.11.10

□ 금후계획

○ 공사완공	: ’08.12.30

오목대 절개지 정비공사

○ 공원경계 절개지가 급경사로 이루어져 토사 붕괴사고 사전예방

○ 공예품전시관 뒤 비탈면을 정지하여 안정된 환경 조성

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 완산구 교동 65-28번지(공예품전시관 뒤)

○ 규    모 : 절개지 정비 H=10m L=50m, 수목식재 1식

○ 사 업 비 : 200백만원

○ 사업기간 : 2008. 6 〜 11월

□ 주변여건

○ 사업장과 인접한 도시가스 정압실 안전 확보 필요

○ 도로, 주차장 점토벽돌포장 및 조경수목의 훼손이 불가피

○ 절개지 상단 느티나무 등 기존 자연수림의 벌목이 요구

○ 산마루 수목 정리로 차폐된 산책로 및 전망대 조망권 확보 필요

□ 추진상황

○ 도시가스 정압실 이설 실무협의(전북도시가스 소순현 외 1) : ’08. 6.20

○ 실시설계 용역 완료	: ’08.10.17

○ 공사 착공	: ’08.11.10

□ 금후계획

○ 공사 준공  : ’08.12.30

보호수 및 노거수 정비사업

보호수․노거수의 외과수술 및 영양제공급, 주변토양개량을 실시

수세회복으로 향토수종의 보존가치 향상

□ 현    황

○ 보호수 : 26주(은행7, 느티9, 왕버들7, 참죽1, 회화1,팽나무1)

○ 노거수 : 67주(느티19, 팽나무15, 왕버들27, 은행2, 기타4)

※ 수령: 300~580년(23주), 200~250년(32주), 100~180년(38주)

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 교동1가 26-3번지 등 25개소

○ 사업규모 : 25주(느티 10, 팽나무 8, 왕버들 3, 회화 1, 은행 3)

○ 사 업 비 : 120백만원

○ 사업내용 : 외과수술 및 영양공급 25주, 주변환경개선 등

○ 사업기간 : ’08. 5.22 ~ 10.31

□ 추진상황

○ 외과수술 및 안전대책 : 25주

- 부패부제거, 살균․살충처리, 방부처리, 동공충전, 인공수피

- 산화방지처리, 수형조절 및 고사지 쇠약지 제거

○ 영양공급 : 부엽토처리 1,350포, 영양제 수간주사 210병,

생리증진제 투여 260kg

□ 금후계획

○ ’09년도 보호수ㆍ노거수 정비 대상지 조사 : ’09.12월까지

학산 등산로 정비사업

○ 시민의 건강에 대한 관심이 높아져 등산객의 증가로 등산로 정비필요

○ 쾌적하고 안전한 등산로 제공 및 민원발생 사전 차단

□ 사업개요

○ 위    치 : 학산(동서학동,서서학동,평화동) 및 보광재 일원

○ 사 업 비 : 150백만원

○ 사업규모 : 5.1㎞(덕천사～흑석골 능선 등 10개 로선)

○ 사업기간 : 2008. 2 ～ 9월

□ 추진상황

○ 실시설계 용역	: ’08. 2 ～ 5

○ 실시설계 용역 보고	: ’08. 4.15

- 등산객 불편사항 및 지시사항 우선시행

∙자연훼손을 최소화하고 지형 특성을 고려하여 설치

○ 등산로 정비사업 추진

- 사업기간 : ’08. 6. 3 ～ 9.19

- 사업내용 : 총연장 5.1km

∙편익 및 운동시설 : 등의자, 허리돌리기 등 8종 47점

∙안전시설 : 로면정비(통나무계단 외 4종 1,434개),안전로프 158경간

□ 금후계획

○ 2009년도 본 예산을 확보하여 등산로 정비 지속추진(200백만원)

- 흑석골~보광재 외 4개 노선 등산로 정비 및 시설물 설치

환경과 소관

ꊱ	테마가 있는 소류지 생태공원 조성사업												---		54
ꊲ	천연가스버스 구입지원	------------------													55
ꊳ	기후변화대응 온실가스 감축 대책추진											---			56
ꊴ	삼천 수질정화시설 설치		-----------------												57
ꊵ	전주시 생태관광지도 및 가이드북 제작												---		58
ꊶ	자연생태박물관 관리 운영			---------------											59
ꊷ	『대기질 향상을 위한』배출가스 정밀검사 정착유도													--	60
ꊸ	도심과 어우러지는 화장실 안내표시								------						61
ꊹ	환경오염물질 배출원 등 관리				------------										62
	다중이용시설 등 실내 공기질 관리강화												---		63
	수질오염총량관리 시행계획 추진						----------								64
	안전한 식품제조가공․유통 웰빙3+ 정착유도										----				65
	남은 음식 싸주고 가져오기 운동 전개							-------							66
	다수인이 이용하는 업소 위생교육					------------									67
	『전주음식』인터넷사이트 운영					------------									68
	『전주로 떠나는 음식여행』웹사이트 운영									-----					69

□ 2008년도 주요성과

○ 청정 전주 이미지 제고를 통한 생태관광산업 육성을 위해 전주자연생태박물관 개관, 지시제 수질개선 및 생태호수 조성

- 전주자연생태박물관 관광객 방문 52,264명(일일평균 347명)

- 지시제 수질개선 및 생태호수 조성(15,220㎡, 956백만원)

- 소류지 생태공원 기본설계(오송제, 구주제)

- 수질개선 생태계복원을 위한 참게(2만마리)․미꾸리(6만마리) 방류

- 생태계 유해식물(돼지풀) 퇴치 환경정화사업 : 4회 1,800명 참여

- 전주시 생태관광지도 및 가이드북 제작(’08.12.7 완료)

- 잘가꾼 문화유산(전주천 수변생태공원) 한국내셔널트러스트상 수상

○ 친환경에너지 천연가스차량 및 충전시설 확대보급, 자동차 배출가스 지도단속 및 무료점검을 실시하여 대기오염 감소로 지구적  기후변화에 대응기반을 구축함

- 천연가스차량 총 390대(기완료 378대, 연말예정 12대)교체 완료

- 자동차 배출가스 지도단속 : 75,423대(기준초과   240대 개선안내)

- 자동차 배출가스 무료점검 : 19,464대(기준초과 1,359대 개선안내)

□  2009년도 운영방향

○ 기후변화대응 저탄소 녹색성장을 위하여 탄소배출거래제(전기부문,

수송부문) 시범운영과 폐식용유 바이오연료화 사업을 전개하고,

자동차 저공해화 사업을 위해 천연가스차량을 보급(21대)할 계획임

○ 인간과 자연이 공존하는 쾌적한 생활환경 조성을 위해 수질오염총량제 이행평가 및 수계모니터링 시스템 구축 용역 추진

- 전주시 일원 3개 단위유역 수질개선(전주A, 만경A, 만경B)

○ 또한 대기질 향상을 위하여 지속적으로 자동차배출가스 점검을 실시하고, 다중이용시설 등 실내 공기질 관리 강화를 통해 시민의 건강을 증진하도록 하겠음

○ 안전한 식품제조‧가공‧유통으로 완전한 웰빙식품 제공과 남은 음식 싸주고 가져오기 실천으로 원자재 절약 및 음식물쓰레기 최소화를 위해 최선을 다하겠음

테마가 있는 소류지 생태공원 조성사업

○ 도시개발 등으로 훼손․매립되어 가고 있는 도심소류지를 친환경적 개발

○ 도심열섬효과 저감․시민 휴식공간 등 체험학습공간으로 자리매김

○ 시민들의 건강 웰빙코스로서 정신적․육체적 안정과 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 위    치 : 송천동 1가 9-1번지 및 팔복동 3가 31번지 일대

○ 규    모 : 오송제 - 유역면적 57ha(유효저수량 45.4천㎥)

구주제 - 유역면적 36ha(유효저수량 14.7천㎥)

○ 사 업 비 : 3,630백만원(오송제 3,220, 구주제 410)

○ 사업내용 : 인공습지 및 침전지조성, 생태호안 조성 및 농산물

직거래장터, 텃밭조성 등

○ 사업기간 : ’08. 7 ~ ’12.12

□ 추진상황

○ 오송제․구주제 생태공원 지킴이 발족(시민,단체,전문가중심)

○ 오송제 생태공원 조성을 위한 타당성 조사 및 기본계획 용역완료 : ’08.2

○ 생태계 보전협력금 반환사업 추진을 위한 환경부 실사(2회) : ’08.5

○ 오송제 부지매입비(400백만원) 및 구주제 기본설계비(10백만원)확보 : ’08.6

○ 구주제 기본설계 착수(10백만원)                         : ’08.10

○ 오송제 생태공원조성 환경부 시범사업 STAR 프로젝트 변경․확대추진   : ’08.10

○ ’09년 구주제 생태공원 조성예산(시비 400백만원) 편성  : ’08.10

□ 금후계획

○ 오송제 생태공원조성부지 매입 추진              : ’08.12

○ 오송제 실시 설계 및 생태공원 조성공사 추진     : ’08.12

○ 구주제 생태공원 조성 추진                      : ’09. 3

천연가스버스 구입지원

○ 도심 대기오염의 주오염원인 경유차량의 천연가스 차량 대체‧보급

○ 환경오염물질 저감을 통한 쾌적한 대기질 향상으로 시민 건강증진과

우리시 기후변화대응 온실가스 감축기여

□ 사업개요

○ 규    모 : 천연가스시내버스 401대 보급

○ 사 업 비 : 34,000백만원(국비4,500 도비1,300 시비3,100 민자25,100)

○ 사업내용 : 시내버스, 학생수송용 버스, 공공기관 출퇴근버스 등 지원

- 경유버스를 천연가스버스로 교체시 차량구매차액보조

- 보조금액 : 대당 18,500천원(국비 50%, 도비 15%, 시비 35%)

○ 사업기간 : 2000. 1 ~ 2010.12월

□ 추진상황

○ 천연가스시내버스 보급 현황(’08.10.31현재)

- 천연가스버스 공급량 : 총 401대 중 355대

○ ’08 천연가스버스 교체대상 19대

- 12대 추가구매 추경예산 확보 : 28,575만원

(국비 13,500, 도비 4,050, 시비 11,025)

○ ’08 천연가스 차량 보급예산 집행 : 7대

□ 금후계획

○ ’08 천연가스 차량 추가구매 12대 집행추진

○ ’09 천연가스 차량 추가구매 21대 구매계획 수립

기후변화대응 온실가스 감축대책추진

○ Post-Kyoto 대비 지역의 이산화탄소 감축을 위한 사업추진

○ 이산화탄소 감축으로 쾌적한 생활환경을 조성 및 감축 필요성의

대시민 홍보와 기후변화협약 적극 대응

□ 사업개요(온실가스 배출현황)

○ 대     상 : 가정․상업(전기, 가스, 수도), 교통(수송), 산업분야 등

○ 사 업 비 : 1,440백만원(국비 240, 도비 240, 시비 960)

○ 사업내용

- 1단계(’08~’09) : 전주권 기후변화대응 전략계획 수립

∙폐식용유배출량 수거 및 바이오 연료생산 시범추진

∙전기 및 수송분야 탄소포인트제 시범실시

- 2단계(’10~’12)

∙가스, 상수도 분야 및 산업으로 확대

∙점진적 확대로 전량수거 및 바이오 연료생산

○ 사업기간 : ’08 ~ ’12년(5개년)

□ 추진상황

○ 환경부 지자체 기후변화사업지원 및 국비확보	: ’08. 4

○ 폐식용유 바이오연료화를 위한 간담회 개최	: ’08. 4.24

- 환경운동연합, 도의원, 시의원, 전주시, 관련기업 등

○ 사업추진을 위한 추경예산(180백만원) 확보 추진	: ’08. 6

○ Green start network 창립을 위한 준비위원회 구성․회의 (4회)

○ 전기분야 탄소포인트제 시범시행	: ’08.10

○ 탄소포인트제 홈페이지 운영(www.cpoint.or.kr)	: ’08.10.25

□ 금후계획

○ Green start network 범시민추진위원회 창립총회 개최 : ’09.1

- 기후변화대응 교육 및 홍보체계 구축 : 전주의제 21

○ 기후변화대응 실천사업 단계별 추진으로 범시민운동 확산:지속

- 전기분야 탄소포인트제 추진                 : ’08.10 ~

- 폐식용유를 이용한 바이오디젤 연료사업 추진 : ’08.10 ~

- 수송분야 탄소포인트제 추진                 : ’09. 1 ~

- 수도 및 가스분야 탄소포인트제 추진         : ’10. 1 ~

삼천 수질정화시설 설치

○ 삼천, 전주천을 비롯한 수공간의 수질개선 및 악취발생 차단

○ 노송천 복원공사시 발생하는 악취 및 수질개선으로 시민들의

쾌적한 생활공간 조성 및 공사시 발생하는 악취민원 사전차단

□ 사업개요

○ 대   상 : 3개소(이동교 아래, 전주대 앞 소하천, 노송천상류)

○ 사업비 : 160백만원

○ 사업내용

- 삼      천(2개소) : 저기압시 발생하는 악취 및 수질개선

- 노송천상류(1개소) : 노송천 복원공사시 발생하는 악취저감

○ 사업기간 : ’08.10.12 ～ ’09. 6.31

□ 추진상황

○ 하천 수질정화사업 선진지 벤치마킹(EM공법)  : ’08. 7.31

- 종로구 홍제천, 성남시 분당구 탄천

○ 전문가 자문 및 환경단체 의견수렴             : ’08. 8. 5

○『이엠(EM)활성액을 이용한』하천수질 및 악취개선 시범사업

- 사업위치 선정 : 3개소

∙삼  천 : 이동교 아래, 전주대 인근 마을 앞 개울

∙노송천 : 천주교 카톨릭센터 옆 노송천 상류

○ 하천수질 및 악취개선 시범사업 시설설치 착공   : ’08.10.23

○ 이엠(EM)활성액 조달구입 요청                : ’08.10.27

○ 하천 수질분석 의뢰                            : ’08.10.28

□ 금후계획

○ 하천수질 및 악취개선 시범사업 시설설치 완공 : ’08.11월중

○ 이엠활성액 투입시설 완료즉시 투입 시작

- 이엠활성액 투입기간            : ’08.11.10~’09. 6.30

○ 투입 전․후 수질개선 여부 지속적 모니터링 : ’08.11～계속

전주시 생태관광지도 및 가이드북 제작

○ 5대 역동산업인 생태관광산업의 발전을 위해 국내․외 에코투어 유치

○ 맑은 공기, 깨끗한 하천, 푸른숲 등 환경자산을 발굴하여 지역브랜드로 육성

○생태탐방로의 네트워크화로 자연과 조화를 이루는 생태탐방문화 확산

□ 사업개요

○ 용역기관 : 전북환경생태연구소

○ 사 업 비 : 45백만원

- 지도제작 1,000장, 가이드북 1,400장, 연구보고서

○ 내    용

- 생태관광지도 : 문화와 연계되는 생태관광코스 개발

- 가 이 드  북 : 생태, 문화 등 세부적 관광자원 소개

○ 기    간 : ’08. 5. 8 ～ 12. 7(7개월)

□ 추진상황

○ 전문가 자문회의 개최                 : ’08. 4.16

- 도시환경분과협의회 9명(교수4, 시민․환경단체3, 언론1, 행정1)

○ 과업지시서 작성 완료(환경과)         : ’08. 4.28

○ 과업수행 착수(전북환경생태연구소)    : ’08. 5. 8

○ 정책조정회의 보고                    : ’08. 6.19

- 보완사항 : 완주와 연결되는 모악산 포함, 중요부분 영어표기

○ 생태관광지도 및 가이드북 중간보고	: ’08.11.14

□ 금후계획

○ 생태관광지도 및 가이드북 최종보고  : ’08.11월중

○ 생태관광지도 및 가이드북 제작 완료 : ’08.12. 7

○ 생태관광지도 및 가이드북 배부      : ’08.12월중

- 관광안내소, 한옥마을 안내소, 공공기관 민원실 등

전주 자연생태박물관 관리운영

○ 자연생태 및 친환경에너지를 체험하는 환경문화의 공간 제공

○ 청정한 전주의 아름다운 자연환경과 전통문화자원을 연계하여

생태관광명소로 육성해 나감 (개관일 : ’08. 5.22)

□ 개    요

○ 건물규모 : 연면적 2,075㎡(지하1층, 지상3층)

- 건축면적 : 1,158㎡(부지면적 18,766㎡)

○ 주요시설 - 자연생태체험관(살아있는 곤충류 어류, 소영상실 등)

- 친환경에너지체험관(햇살자동차 등 24종, 에너지영상실 등)

- 야   외 : 수변생태공원, 야생화학습장

□ 추진상황

○ 관람실적(10.31기준) : 56,264명(일일평균 347명)

- 전북권 : 53,982명(96%), 외부지역 : 2,282명(4%)

○ 자원봉사 해설사 모집(70명) 관람서비스 제공 : ’08. 4.22

○ 자연생태학습 체험 프로그램 운영	: 13회

- 참여인원 : 591명(여름160, 가을390, 불우아동41)

○ 관람객 유치 및 활성화를 위한 집중홍보	: 21회

- 전국 교육기관 17,577개소(2회), 언론 인터뷰 등(19회)

○ 살아있는 곤충 및 대형어류 전시시설 확충	: ’08. 8.20

- 곤충류 : 장수풍뎅이 등 5종, - 어류 : 황쏘가리 등 6종

○ 차별화된 박물관 운영을 위한 관람객 만족도 조사 : 3회

- 해설(92%), 친절도(94%) 만족, 인기 곤충류 등 전시의견

□ 금후계획

○ 관람객 유치 및 활성화를 위한 집중홍보	: ’09. 3

○ 대형어류 전시용 수족관 설치 다양한 볼거리 제공 : ’09. 4

○ 인기 곤충류 산란용 수목 식재 생태환경 조성	: ’09. 5

○ 자연생태체험 학습 계절별 이벤트 행사	: ’09. 1~12

「대기질 향상을 위한」

배출가스 정밀검사 정착유도

○ 악화된 도시지역의 대기환경 개선을 위하여 대기오염 비중도가

높은 자동차의 차별된 관리 수단 필요

○ 수도권 및 50만 이상 도시지역에 한하여 제한적 시행 6개시(’08.1)

※’02년부터 단계적 시행(서울․경기․인천 및 5개 광역시)

□ 사업개요

○ 대    상 : 관내 차량 총218,233대 중 98,000대/년

○ 검사주기 : 비사업용승용 1회/2년, 이외차량 1회/년 (정기검사병행)

○ 검사사항

- 스모그 원인물질인 질소산화물(NOX) 항목추가

- 엔진관련검사(최대출력, 정격회전수)추가

○ 검사기관

- 교통안전공단 자동차검사소 외 16개소

□ 추진상황

○ 정밀검사 대상자에 대한 안내장 발송 : 83,419건

○ 정밀검사 미수검자에 대한 독촉장 발송 및 과태료 부과

- 과태료 부과 7,061건(945,406천원)

○ 과태료 체납자에 대한 재산(자동차) 압류 : 2,429건

□ 문제점 및 대책

○ 자동차 정기검사와 정밀검사가 이원화 되어 차량 소유주의 혼선  초래 및 검사수수료 추가 부담에 따른 민원 발생

- 자동차 관리법 개정으로 국토해양부 소관 자동차종합검사 체계로 운영(’08.3.28일 개정)

○ 차량 미소유(대포차 등)로 인한 미수검으로 과태료 발생 증가

- 차령15년 경과차량 운행여부 확인하여 과태료 면제

□ 금후계획

○ 자동차 종합검사 통합 운영(국토해양부) : ’09. 4월

도심과 어우러지는 화장실 안내표시

○ 공중․개방화장실 관련 표지판 노후 및 가시성 미흡과 설치

기준 없이 난립으로 도시미관의 부조화

○ 전주천 삼천 산책객의 이용 편리를 위한 위치표시 필요

□ 사업개요

○ 대    상 : 219개소(공중화장실 145, 개방화장실 74)

○ 소요예산 : 80백만원

○ 세부내용

- 개방화장실 관련 표지판 표준 디자인 마련 제작

- 표지판 설치위치 규격 등 세부기준 마련

- 천변 산책로 위치 표시 안내판 설치

○ 사업기간 : ’08. 9 ~ 12

□ 추진상황

○ 공공디자인 관련법규 검토(공공안내 그림표지 국가표준)

- 남녀 그림표시에 대한 변형은 불가하나 외형틀 등 보완가능

○ 화장실 표시 디자인 관련 부서협의 : 아트폴리스과

○ 선진지 우수 운영사례 견학 : 청주시, 양재천 등

□ 문제점 및 대책

○ 전주천‧삼천변 산책객 증가에 따른 화장실의 부족

⇨ 사용가능한 화장실 위치표시 강화로 편의도모

□ 금후계획

○ 화장실관련 표지 통일 표준 디자인안 마련 : ’08.10～11

- 가시성, 통일성 등 식별 용이성 주안점

○ 표지판 규격․설치위치 등 운영 기준마련  : ’08.10～11

○ 표준 디자인 안에 맞춘 표지판 제작 교체  : ’08.12

환경오염물질 배출원 등 관리

○ 폐수․대기, 유독물, 의료폐기물 등 환경오염물질 배출원 관리

○ 환경오염원 발생 예방을 위한 시설점검 및 주기적인 지도 계몽

□ 사업개요

○ 관리대상 : 2,638개소(폐수․대기배출업소 594, 의료폐기물 배출업소 878

토양오염유발시설 306, 유독물취급업소 29, 기타 831)

○ 방     법 : 배출원별 정기 및 수시 지도점검(공기질 검사 병행)

- 정기점검 : 배출원별 규모별․등급별 차등 실시

- 수시점검 : 민원야기 및 적색업소, 갈수기․장마철 등 취약시간대

※ 점검반 : 3개반 6명(명예환경감시원, 유관기관, 전주시 합동)

□ 추진상황

○ 갈수기 폐수배출업소 민‧관 합동 지도점검 실시	: 189개소

○ 유독물 취급사업장 지도점검 실시 (29개소)	: 2회

○ 환경관리 취약업소(배출허용기준 초과 등) 기술지원	: 25개소

○ 봄철 비산먼지 발생사업장 특별점검 실시	: 138개소

○ 전라북도 주관 관내 배출업소 교차점검 실시	: 1회(6개소)

□ 금후계획

○ 무허가(신고) 오염물질 배출업소 지도․단속 실시(12월중)

- 유관기관 및 민‧관 합동 단속 추진

○ 가을철 비산먼지 발생업소 지도․단속 실시

- 각종 공사장 및 골재 야적장 중점 추진

다중이용시설 등 실내 공기질 관리 강화

○ 다중이용시설의 실내 공기질 적정 관리로 국민건강 보호

○ 새집 증후군이 문제되는 신축 공동주택의 환경상의 위해 예방

□ 사업개요

○ 관리대상 : 112개소(다중이용시설 102, 공동주택 10)

- 다중이용시설 : 찜질방, 대규모점포, 병원, 실내주차장 등

- 공동주택 : 신축중인 100세대 이상의 아파트, 기숙사 등

※ ’08.1.1부터 바닥연면적 860㎡이상의 법인․민간보육시설(24개소)이 관리대상에 추가(다중이용시설 등의 실내공기질관리법 시행령 제2조)

○ 관리사항(소유 또는 점유자)

- 다중이용시설 : 공기질 자가측정(기록보존) 및 환기시설 유지관리

- 공동주택 : 입주 3일전까지 공기질 측정 및 60일간 공고

□ 추진상황

○ 검사기관을 통한 다중이용시설 실내공기질 측정 실시(6개소)

- 실시업소 : 의료기관 5, 대규모점포 1

- 검사항목 : 미세먼지 외 4개 항목(유지기준)

- 검사결과 미세먼지 유지기준 초과(1개소) : 과태료(200만원) 부과

○ 다중이용시설 환기시설 관리상태 현지점검 실시(99개소,2회)

- 전체 시설이 관리기준에 적합하게 관리

□ 금후계획

○ 하반기 검사기관을 통한 다중이용시설 실내공기질 측정 실시(5개소)

- 검사기관 : 전라북도 보건환경연구원

○ 다중이용시설 관리요령 등 환경보전협회 위탁교육 실시(115개소)

- 교육 미이수자 과태료 부과

수질오염총량관리 시행계획 추진

○ 유역별 목표수질 달성을 위한 연도별 이행평가 실시 및 종합관리

○ 수질오염총량제 시행계획에 따른 과학적인 수계관리 시스템 구축

□ 사업개요

○ 사업기간 : ’06 ~ ’10년(2차년도 : ’11년부터)

○ 관리유역 : 3개 단위유역(전주A, 만경A, 만경B)

○ 사 업 비 : 320백만원(국비 200, 시비 120)

○ 관리항목 : 생물화학적산소요구량(BOD)

○ 목표수질 : 전주A 9.0 ⇨ 5.9ppm, 만경B 4.4 ⇨ 4.2ppm

- 연도별 할당 부하량

(’06년:9,547kg/일, ’08년;7,557kg/일, ’10년:6,850kg/일)

□ 추진상황

○ 수질오염총량관리 시행계획 승인             : ’06.10.25

○ 수질개선특별회계 설치 및 운영조례 제정      : ’07. 1. 5

○ 연도별(’06, ’07) 수질오염총량관리 이행평가 실시   : ’06.9~’08.6

○ ’08년도 수질오염총량관리 이행평가 용역 계약 : ’08. 6.26

- 개발사업 DB구축, 누적관리대장 관리, 할당부하량 준수 등

- 수계별 모니터링 시스템 구축사업 실시(목표수질 초과 사전예측)

□ 금후계획

○ ’08년도 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 추진 : ’08.7 ~ ’09.6

- 수질총량업무추진 : ’08. 7 ~ ’09. 3

- 이행보고서 제출 및 시행계획 변경(전라북도, 환경청)  : ’09. 3 ~ ’09. 6

※ 매년 3월말까지 지방 환경청에 이행보고서 제출

○ 2단계(’11~ ’15년) 수질오염총량관리 시행계획 수립 추진 : ’09. 1~ 12

안전한 식품제조가공‧유통 웰빙 3+정착 유도

식품제조․가공 및 판매유통관리를 철저히 하여 미래세대의 어린이, 청소년 건강과 성인․노인까지 건전, 안전, 완전한 웰빙식품  제공으로 시민건강증진 도모

□ 사업개요

○ 대    상 : 436개소

- 식품제조․가공업소 202,학교주변유해업소 211,유통식품판매업소 23

○ 추진방향

- 중점적 관리 대상업소 DB화 작성추진

- NGO등 지도단속반 구성 로테이션 지속관리(4인1조) : 매월

- 관련단체(식품소비자, 음식업단체), 구청, 업소 협력체계 구축 추진

- 초중고 자모활용 학교주변 그린푸드 거리 조성

□ 추진상황

○ 식품안전의날 운영, 식중독예방 홍보 가두캠페인 실시 : 1회 1,700명

○ 식품제조가공업소 및 특별관리대상식품 수거검사 : 3회 222건

○ 학교주변 문방구 및 음식점등 위해식품근절 지도단속 : 4회 324개소

○ 부정불량식품, 유통식품, 학교주변 문방구 지도단속 : 6회 470개소

○ 식중독예방을 위한 단체, 위탁급식 식재료 위생관리 지도 : 2회64개소

○ 학교주변식품안전지킴이 위촉 및 발대식	: ’08. 9

○ 교육청을 통한 초․중 어린이의 올바른 식습관 기르기 공문발송 : ’08.11

○ 안전한 먹거리 제공. 위생서비스를 위한 접객업 등 워크숍 개최 : ’08.11

□ 금후계획

○ 부정불량식품, 유통식품, 학교주변 문방구 지도단속 : 년 중

남은 음식 싸주고 가져오기 운동 전개

풍요롭고 알찬 상차림의 음식물을 재사용한다는 우려를 사전에 차단하여 불신감을 해소하고 과소비와 원자재 절약, 음식물쓰레기 최소화 등 음식문화 개선 정착유도

□ 사업개요

○ 대    상 : 5,773개소(완산 3,325, 덕진 2,448)

- 한식 2,845, 중식 212, 일식 153, 양식 229, 분식 373, 기타 1,961

○ 추진방법 : 구청, 관련 음식업단체, 업소 공동 추진

○ 수    량 : 476개소(완산 238, 덕진 238)

○ 총사업비 : 20백만원(식품진흥기금)

○ 사업기간 : 연  중

□ 추진상황

○ 위생교육시 남은 음식 싸주기 교육 및 홍보 : 25회 4,451명

○ 언론사(신문‧방송 등) 남은 음식물 싸주고 가져오기 홍보 : 7개소

○ 여성단체를 통한 남은 음식물 싸오기 붐 조성 홍보 : 1회 22명

- 주부교실, 대한주부클럽, 한국부인회, 시민참여교실 등

○ 남은 음식물 싸주기 홍보물 제작 배부	: 1,500명

○ 남은 음식물 싸주기 가두캠페인 전개	: 1회 1,700명

○ 모범음식점 및 대형업소 진공포장용기 지원	: 476개소

□ 금후계획

○ 정기(수시) 위생교육 시 남은음식물 싸주기 교육 : ’08.12

○ 음식물 싸주기 우수업소 평가, 인센티브 제공    : ’08.12

다수인이 이용하는 업소 위생교육

내․외국인이 방문하는 위생업소 업주 및 종사자에게 철저한 교육을 통한 양질의 서비스 제공으로 다시 찾고 싶은 전주이미지 제고

□ 사업개요

○ 교육대상 : 13,566개소(식품 10,746, 공중 2,820)

○ 교육기관 : 위생관련단체, 지방자치단체

○ 교육회수(방법) : 70회(식품50,공중20) / 정기‧수시 집단교육

○ 총사업비 : 1백만원

○ 사업기간 : 연  중

□ 추진상황

○ 공중위생교육 관련단체 위탁승인           : 7개 단체

- 숙박, 목욕, 미용(완산,덕진,효자), 건물위생관리인, 물수건위생처리

○ 관련단체 교육계획 승인 후 단체장 간담회 개최 : ’08. 3

○ 식품위생업 영업주 위생교육              : 43회 6,416명

○ 공중위생업 영업주 위생교육              : 15회 2,329명

○ 공중위생영업자에 대한 위생교육 단체 지정 알림 : ’08.8.8

(보건복지부고시 제2008-59호 지정고시)

□ 금후계획

○ 공중․식품위생업소 영업주 위생교육         : ’08.12

○ 위생교육시 시정 홍보(음식물쓰레기 분리배출 등)   : ’08.12

「전주음식」인터넷사이트 운영

“천년전주”맛에 부합하도록 유명음식을「전주음식」사이트 운영을

통하여 적극적인 홍보로 맛의 명성제고와 부가가치 상승

□ 사업개요

○ 대   상 : 5,975개소(일반음식점 5,773, 식품제조‧가공업 202)

※ 중점관리 : 277개소(모범음식점 269, 식품제조‧가공업소 8)

○ 추진방향 :「전주음식」인터넷사이트(www.jeonjufood.or.kr) 홍보

- 업주인사말, 음식가격, 업소위치, 주차․편의시설 등

○ 총사업비 : 9백만원

○ 사업기간 : 연  중

□ 추진상황

○ 전주음식 사이트 이미지 재구성 및 유지보수 계약 : ’08.3

○ 식품,공중위생관련업종 연계 베너 및 콘텐츠설치 운영 : ’08.3

○ 국내유명 포탈 사이트(네이버,다음,야후 등)에 검색창 설치 활용 : ’08.3

○ 전국 각 지자체,관광공사 등 전주음식 사이트 활용 홍보 : 2회

○ 모범음식점 및 숙박업소 자료 추가 및 수정 게재   : ’08.8

○ 인터넷사이트 접속 방문자 고객맞이 설문평가      : 866명

○ 전주음식 사이트 유지보수                   : ’08. 4~11

□ 금후계획

○ 전주음식 인터넷 사이트 유지보수	: ’08.12

○ 전주음식 인터넷 사이트 활용 홍보	: ’08.12

「전주로 떠나는 음식여행」웹사이트 운영

숙박‧음식점‧여행사가 컨소시엄으로 관광 패키지를 창출 여행

기획 상품으로 전국 관광객을 유치 지역경기 재원 상승

□ 사업개요

○ 대    상 : 6,124개소(일반음식점 5,773, 숙박업 351)

※ 중점관리대상 : 448개소(모범음식점 269, 숙박 179)

○ 추진방향 :「전주로 떠나는 음식여행」사이트(www.tour.jeonjufood.or.kr)홍보

- 자유여행상품, 패키지상품, 커뮤니티, 숙박․음식업소 홍보

○ 총사업비 : 4백만원

○ 사업기간 : 연  중

□ 추진상황

○「전주음식」사이트(www.tour.jeonjufood.or.kr)시험운영 : ’08.1

○ 각종 행사(축제,문화재,문화공간) 관광지 검색창 설치 : ’08.5~6

○ 전국 각지자체, 관광공사 등 사이트 활용 홍보 : 2회

○ 숙박업 영업주 대상 운영사이트 게재 및 활용 교육  : 2회 350명

○ 일반음식점 위생교육시 운영사이트 교육 및 홍보  : 18회 3,455명

○ 전주로 떠나는 음식여행 사이트 유지보수     : ’08.4~11

□ 금후계획

○ 전주로 떠나는 음식여행 사이트 유지보수  : ’08.12

○ 웹사이트 운영프로그램 활용 등 지속 홍보 : ’08.12.