제259회 전주시의회 제2차정례회

행정사무감사/도시건설위원회

2008년도

주요업무 추진상황 보고

상하수도 사업소

보 고 순 서

□  일  반  현  황        ------------------          1

□  부서별 주요기능         -------------           2

□  기  본  현  황               --------------      3 ~ 7

□  부서별 주요업무 추진상황     --------          8

○  수도행정과 소관      ------------     9~12

○  급 수 과   소관     -------------    13~18

○  수질관리과 소관      ------------     19~23

○  하 수 과   소관      ------------    24~30

일 반 현 황

□ 기구 및 인력

○ 기  구   -   4과 13담당(1전산실,1실험소,1센타,17사업장)

																																																								상하수도 사업소
			수도행정과																																					급 수 과																																		수질관리과																				하 수 과
	수도행정							요금							체납징수																						유수율제고										급수시설											누수방지						계량기관리											수질관리					수질분석						생산관리								하수행정			하 수 시설			하수정비
	전산실							누수방지센타						계량기시험소								방수리취수장			삼천취수장								원당취수장				전미취수장									상관수원지																								인후배수지		천마배수지			효자배수지			완산배수지		송천배수지				서신배수지					금암배수지			화산배수지				대성정수장	지곡정수장		상관정수장	팔복정수장

○ 인   력

부서 직급		정원	현 원
			계	수도행정과	급 수 과	수질관리과	하 수 과
합계		98	97	24	29	32	12
일반직	소계	57	56	11	17	16	12
	4급	1	1	1
	5급	4	4	1	1	1	1
	6급	13	13	3	4	3	3
	7급	23	31	6	7	11	7
	8~9급	16	7	-	5	1	1
연 구 사		3	3	-	-	3	-
기 능 직		38	38	13	12	13	-

※ 청경 16명,  상용직 13명,  상용나급 11명

부서별 주요기능

과 별	주 요 업 무	비 고
수도행정과	• 상수도사업 경영혁신 및 경영평가 • 지방채 및 자치법규 제․개정 • 계약 및 물품관리 • 상수도사용료 부과징수 업무 • 검침업무 위탁관리, 실사 이의신청 처리 • 세입현계, 과오납, 자동납부신청, 환불, 누수감액 • 공기업특별회계 금고계약 및 관리
급 수 과	• 유수율제고 중장기 계획 • 급수공사 신청서 접수 및 승인 • 노후급수관 교체 및 통합공사 • 맑은 물 공급사업 • 배수관 및 급수관 시설공사 • 블록시스템 구축사업 • 누수탐사 및 누수복구 • 누수신고센타 운영관리 및 누수복구작업 • 마을 상수도 유지관리 • 수전관리, 수도계량기 교체 • 계량기 실태조사 및 관리
수질관리과	• 생활용수 수요에 따른 정․원수 확보 • 광역상수도 수급에 관한 업무 전반 • 취․정수장 배수지 등 사업장 시설 유지관리 • 먹는 물 공동시설(지정약수터) 수질검사 • 사업장 시설물 유지관리 • 국가공인 수질검사기관 운영관리 • 공업용수 수급 및 유지보수
하 수 과	• 하수도공기업특별회계 세입 세출예산 및 결산 • 하수도사용료 조정 및 징수관리 • 금강수계관리기금 업무 • 화산․덕진처리구역 하수관거 정비사업 • 하수관거정비 민간투자(BTL)사업 • 마을하수도 유지관리 • 하수처리장 운영관리 및 시설물 유지관리

기 본 현 황

□ 급수 인구

총인구	급수인구	보급율 (%)	1일 1인 급수량(ℓ)	급수전	유수율(%)	무수율(%)	비고
명 627,339	명 621,935	99.1	403	197,214	61.3	38.7

□ 수계별 생산 및 급수구역

구 분			시설용량 (천㎥/일)	급수량 (천㎥/일)	급 수 지 역	급수인구	비율 (%)
총 계			328	293		621,935	100
생활용수	합 계		258	251	33개동	621,935	100
	자체상수도	대 성	40	40	동․서서학, 중화산1, 완산, 효자1일부, 삼천1일부, 평화1.2일부	99,011	15.9
	광역상수도	전주권	218	211	중앙,풍남,노송, 서신, 삼천1일부. 2. 3, 중화2, 평화1.2일부, 효자1일부.2. 3. 4, 진북, 인후1.2.3, 금암1.2, 덕진, 우아1.2, 호성, 팔복, 송천1.2, 조촌, 동산.	522,924	84.1
공업 용수	팔복정수장		70	42	팔복동 1, 2공단		18개 업체공급

※ 생활용수 급수구역은 생산량 및 수요량에 따라 조절

□ 도․송․배․급수관

단위 : ㎞

총 연 장	도 ․ 송 수 관	배 수 관	급 수 관	비 고
2,136	57	684	1,395

□ 상수원 보호구역

상수도사업장	보 호 구 역			구역지정일	보호시설
	면적(㎢)	상류(Km)	하류(Km)		안내판	표주
계	26.96				42	132
방수리취수장	0.27	1.0	0.5	72. 5. 5.	7	24
상관수원지	25.99 (마치12.00 의암13.99)	전유역		24. 6. 9.	10	26
삼천취수장	0.28	2.2 (독배천0.7)	0.3	82. 6.19.	11	42
원당양수장	0.10	1.0	0.1	80. 8. 4.	6	16
전미취수장	0.32	0.5	0.3	67. 8. 5.	8	24

□ 상수원 수계별 『댐』 저수량

수 원	위 치	만수량(천㎥)	관리기관	비 고
계		817,139
상 관 제	완 주 군	2,139	전 주 시	대성수계보충
용 담 댐	진 안 군	815,000	수자원공사	전주권광역

하수도 기본현황

□ 하수도

구 분		처리구역 (㎢)	계획연장 (㎞)	시설연장 (㎞)	미시설연장 (㎞)	보급율 (%)	비고
계		54.97	1,826	1,392	434	76.2
합 류 식			0	621	0	100.0
분류식	소 계	54.97	1,826	771	1,055	42.2
	오수관거	-	902	443	459	49.1
	우수관거	-	924	328	596	25.5

□ 차집관로

하 천 명	연 장 (㎞)	맨 홀 (개)	우수토실 (개소)	환기구 (개소)	여수토실 (개소)
계 (6개노선)	88.9	1,010	251	73	5
전주천 (좌, 우안)	23.5	369	142	37	4
삼 천 (좌, 우안)	15.4	155	45	18
금암천 (좌, 우안)	4.4	82	38	9
아 중 선	12.0	174	16	4
팔복선(공장,생활)	16.9	183	8	5	1
상 관 라 인	10.4	47	2
기 타	6.3

□ 하수․위생처리 시설

구 분	하 수 처 리	위 생 처 리
위 치	덕진구 송천동 2가 1035번지
시설용량	1일 처리능력 ⇨ 403,000㎥ - 1단계 시설 : 113,000㎥ - 2단계 시설 : 190,000㎥ - 3단계 시설 : 100,000㎥	1일 처리능력 ⇨ 290㎘ - 분 뇨 : 30㎘ - 정 화 조 : 260㎘
처리방법	1․2단계 고도처리(CNR)공법 3단계 고도처리(CSBR) 공법	하수 연계처리 (1994년부터 시행)

2008년 상수도 공기업 예산

총 규 모 : 70,085백만원

(단위 : 백만원)

세 입			세 출
계 : 70,085(100%)			계 : 70,085(100%)
○ 상수도사업수익 : 54,983(78.5%)			○ 상수도사업비용 : 46,987(67.0%)
◦ 영업수익 : ․ 급 수 수 익 : ․ 급수공사수익 : ․ 기타영업수익 : ◦ 영업외수익 : ․ 예금수입이자 : ․ 타회계전입금 : ․ 기타영업외수익 :	53,704 50,676 2,602 426 1,279 532 580 167		◦ 인 건 비 : ◦ 물 건 비 : ◦ 이전경비 : ◦ 급수공사비 : ◦ 지급이자 : ◦ 예 비 비 :	6,015 35,181 1,567 1,423 2,301 500
○ 자 본 적 수 익 : 10,650(15.2%)			○ 자본비용 : 23,098(33.0%)
◦ 고정부채수입 :	10,000		◦ 자본투자비 :	18,439
◦ 자본잉여금수익 :	650		◦ 부채상환금 :	4,359
○ 예 산 외 계 정 : 4,452(6.3%) (과년도계정)			◦ 예 비 비 :	300

2008년 하수도 공기업 예산

총 규 모 : 29,925백만원

(단위 : 백만원)

세 입			세 출
계 : 29,925(100%)			계 : 29,925(100%)
○ 하수도사업수익 : 16,551(55.3%)			○ 하수도사업비용 : 11,465(38.3%)
◇ 영 업 수 익 : 14,363(48%)			◇ 영 업 비 용 : 11,000(36.7%)
			◦ 관 거 비 :	1,000
◦ 하수도사용료수익 : ◦ 기타영업수익 :	14,294 69
			◦ 운 영 경 비 :	40
◇ 영업외 수익 : 2,188(7.3%)
			◦ 일반관리비 :	9,960
			◇ 영업외 비용 : 330(1.1%)
◦ 수입이자 : ◦ 타회계전입금수익 :	400 1,788
			◇ 특별손실 : 35(0.1%)
			◇ 예 비 비 : 100(0.4%)
○ 자 본 적 수 익 : 8,751(29.2%)			○ 자본적지출 : 18,460(61.7%)
◦자본잉여금수익	8,751		◦ 가동설비자산 :	14,493
			◦ 비가동설비자산 :	1,835
․ 타회계건설보조금 :	3,051
			◦ 고정부채상환금 :	1,531
․ 공사부담금 :	5,700
			◦ 기타자본적지출 :	13
○ 예 산 외 계 정 : 4,623(15.5%) (과년도계정)
			◦ 예 비 비 :	588

부서별 주요업무 추진상황

수도행정과  소관

급 수 과  소관

수질관리과  소관

하 수 과  소관

수도행정과  소관

「다양하고 더욱 편리해진」

맞춤형 상수도 요금서비스 이용 확대  ․․․․․․ 10~11

「건전재정 확충 실현을 위한」

상수도 체납사용료 징수율 제고  ․․․․․․․․․․․․․  12

「다양하고 더욱 편리해진」

맞춤형 상수도 요금서비스 이용 확대

○ 인터넷의 대중화로 상수도 행정 서비스에 대한 시민들의 욕구가

날로 증가하고 있어 다양하고 더욱 편리한 맞춤형 요금서비스를

실시간 제공함으로써 시민 편의 및 상수도 행정의 만족도 제고

□ 개  요

○ 그간 민원처리가 주로 전화 또는 방문 등 오프라인 상에서만 가능하여   시민이 만족할 만한 서비스 제공에 한계가 있었으나,

○ 시민이 언제 어디서든지 온라인상(상하수도사업소 홈페이지)에서

요금조회납부․이사정산․체납조회 등이 가능토록 시스템 구축 시행

□ 그동안 추진상황

○ 맞춤형 상수도 요금 홈서비스망 구축 시행(2월) 및 홍보 추진

-「상수도 요금 ! 이제는 온라인상에서 다 해결해 줍니다」홍보물 배부 194천매

- 매월 고지서에 홍보안내문구 표기 홍보

○ 홈서비스망을 이용한 요금 민원 편의 제공으로 인한 유선․방문       민원이 25% 감소되어 더욱 상세하고 친절한 서비스 제공

- 요금납부조회, 이사정산, 체납조회 등 이용 : 월 8,000건 접속

○ 납부방법의 다양화 및 이용 증대 (10월 기준)

- 자동 납부 / 월 65,968건(’07) → 71,362건(’08)

- 가상계좌 납부 / 월 4,900건(’07) → 6,000건(’08)

- 홈페이지 인터넷 지로 연계 납부/ 월 5,000건(’07) → 8,000건(’08)

○ 다양하고 편리한 요금 납부방법 제공을 위한 시책 발굴

- OCR고지서 도내  납부, 가상계좌 은행 복수화, 신용카드 납부등(’09년)

○ 요금납부서비스 개선을 위한 타지자체 벤치마킹 : 서울시 등 7개 기관

□ 금후계획

○ 상수도 요금 인터넷 서비스 지속 홍보를 통한 이용 증대 추진

○ 홈페이지 프로그램 보완 및 편리한 납부제 시행을 위한 벤치마킹 추진

맞춤형 상수도 요금서비스 이용확대 시행(안)

■ 개편 전 홈페이지 “견본”

■ 개편 후 홈페이지 “견본”

「건전재정 확충 실현을 위한」

상수도 체납사용료 징수율 제고

□ 현  황

ꡑ08.10.31 현재                             (단위 : 천건, 백만원)

구분	조 정 액		징 수 액		체 납 액		징수율 (%)	비고
	건수	금 액	건수	금 액	건수	금 액
계	2,131	46,912	1,954	43,692	177	3,220	93.1
현년도	1,971	44,285	1,885	42,260	86	2,025	95.4
과년도	160	2,627	69	1,432	91	1,195	54.5

□ 그동안 추진상황

○ 특별징수기간 운영 : 2회

○ 상수도요금 체납액 징수 및 독려

- 계고장 교부 : 2,918명 / 3,175백만원

- 고액체납자(세입자) 건물주에게 납부독촉 : 2,108명 / 1,184백만원

- 경기침체에 따라 고액체납자 분납유도(각서 및 납부계획서 징구)

○ 고액체납 수용가 행정조치

- 급수중지(단수) : 154개소, 342,525천원

- 개전 : 128개소, 245,360천원/ 미개전 : 26개소, 97,165천원

□ 문제점 및 대책

○ 집합건물 및 생계형 영세상인 등 다수민원 예상으로 행정조치(단수) 지연

○ 경락 및 경기침체, 사업부도 등 행불로 체납액 증가

○ 다량건수 체납자 장기폐문으로 징수(단수 등) 어려움

⇨ 고액체납자, 영세상인 등 분납유도 및 경락, 행불자 재산조회 후 결손처리

□ 금후 추진계획

○ 5건 이상(20만원 이상) 체납액 독려부 작성 특별관리

○ 단수처분 후 미개전수용가 특별관리(도수 및 훼손방지)

○ 고액(다량건수)․고질 체납자 방문독려

- 행정절차 이행 후 단수조치 등 강력징수(분납징수, 재산압류 등)

급 수 과  소관

유수율 제고를 위한 블록시스템 구축사업   ․․․․․․․․․․  14

상수도 100% 확대 공급사업   ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․    15

체계적이고 전문적인 누수탐사 확대   ․․․․․․․․․․․․․․․  16

상수도관로 위치표지 설치사업   ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․   17

대형 계량기실 확장 및 배관구조 개선사업 ․․․․․․․․․․․․ 18

「유수율제고를 위한」 블록시스템 구축사업

2012년까지 유수율을 85% 이상 향상시켜 상수도 경영합리화를    도모하고, 선진화된 급수체계를 구축하여 맑고 깨끗한 수돗물  공급으로 상수도 서비스 품질을 높이고자 함.

□ 사업개요

○ 총사업비 : 1,436억원

○ 사업기간 : 2006년 ～2012년 (7개년)

○ 사업내용

- 블록고립 및 균등수압 안정화 128개 블록

- 노후블록에 대한 노후관 및 불용관 집중정비 50개 블록

- 통합 전산감시시스템 구축 1식

□ 그동안 추진상황

○ 기본설계 및 입찰안내서 작성 용역 완료  ----- ‘07. 8. 24

○ 블록시스템 구축사업 공사 입찰공고(조달청) -- ‘07. 9. 14

○ 기본설계 심의 토론회(평가위원회) 개최 ------ ‘07.12. 21

○ 적격자결정 무효확인 소 제기(전주지법) ------ ‘08. 5. 16

○ 적격자결정 무효확인 판결(전주지법) --------- ‘08. 7. 25

○ 광주고법 항소(참여업체) -------------------- ‘08. 8. 13

○ 전면책임감리용역 계약 ---------------------- ‘08. 9. 18

○ 광주고법 소 취하(참여업체) ----------------- ‘08.10. 14

○ 행정절차이행 중 ---------------------------- ‘08.10.28～

□ 금후계획

○ 행정절차이행 마무리 ------------------------  ‘08. 11월

○ 실시설계 적격심의 --------------------------   ‘08. 12월

○ 업체선정 및 공사계약 -----------------------  ‘09.  1월

○ 공사기간  --------------------------  ‘09.1월～’12.12월

상수도 100% 확대 공급사업

상수도 공급혜택을 제대로 받지 못하고 지하수나 간이상수도를 사용하고

있는 농촌 변방동 마을 및 고지대에 맑고 깨끗한 수돗물을 공급하여

시민보건위생 향상코자 함.

□ 사업개요

○ 총사업비 : 18,515백만원

○ 사 업 량 : 배수관 포설 L=152㎞, 가압장 신설 8개소

○ 사업기간 : 1999년 ～2010년(12개년)

○ 수혜가구 : 125개마을/4,171세대/16,475명

□ 그동안 추진상황(전체공정 : 90.6%)

○ 2007년까지 실적 : 배수관 포설 L=131.1㎞, 가압장 신설 6개소

- 사 업 비 : 14,840백만원 (일반 6,870, 특별 7,970)

- 수혜가구 : 114개마을/3,824세대/15,180명

○ 2008년 추진상황 (현 공정 : 95%)

- 사 업 비 : 1,024백만원(당초 544, 1회 추경 480)

- 사 업 량 : 배수관 포설 L=6.6㎞, 가압장 신설 1개소

- 수혜가구 : 5개마을/111세대/400명

- 현재까지 추진사항 : 완료 3개 지구, 추진중 1개 지구

․공사완료 : 삼천동 서지마을(L=0.3㎞), 여의동 용정마을(L=1.8㎞),

우아동 관암․무능마을 (L=3.5㎞)

․진 행 중 : 우아동 아중로~아중마을(L=1㎞) --- 11.30완료예정

□ 금후계획

○ ‘08년도 사업 잔여분 11월 말까지 마무리 추진

체계적이고 전문적인 누수탐사 확대

누수지점을 찾아 복구함으로서 유수율 향상에 기여하고 상수도 공기업  경영효율화를 도모함은 물론 시민편익 증진에 기여하고 소중한 수자원을  보호하고자 함

□ 사업개요

○ 사 업 비 : 50백만원

○ 사업기간 : 2008. 9월～ 2008.12월

○ 사 업 량 : 누수탐사 116개소

○ 사업위치 : 완산동, 우아동, 중화산동, 인후동, 긴급민원지역

※ 전주시 급·배수관로 2,079㎞ 중 블록시스템 구축사업 외 지역(126㎞)         위주로 추진하되, 블록시스템 구축사업지역도 병행 추진

□ 그동안 추진상황

○ 누수탐사대상지 조사 ------------------------   ‘08. 8월

○ 자체설계 완료 ------------------------------   ‘08. 9월

○ 누수탐사용역 계약 및 착수 ------------------   ‘08.10월

○ 누수탐사(용역) 추진사항

- 완산동, 효자동(안행지구) 및 우아동 지역 누수탐사 및 복구완료 : 30개소

- 긴급 누수탐사 및 복구 완료 : 인후동 서낭당고개 인근 외 10개소

□ 금후계획

○ ‘08 누수 탐사 용역분(단가계약) 12월 중순까지 마무리 추진

(블록시스템 구축사업 지역 및 외 지역 병행 추진)

상수도관로 위치표지 설치사업

관로파손 및 사고위험의 근원적 해소를 위하여 기존 상수도관로

매설위치에 표지판을 설치하여, 각종 공사 등으로 인한 수도관 파손을

사전에 예방하고 단수로 인한 시민피해를 최소화 하기 위함.

□ 사업개요

○ 사 업 비 : 200백만원(기50, 금회50, 이후100)

○ 사업기간 : 2007 ～ 2010.

○ 사 업 량 : 677km(송ㆍ도수관 57, 배수관615)

- 금회 사업량 : 상수도관로 L=68.4km

․ 표지못 설치 1,870개소, 표지석 설치 39개소

○ 사업내용

- 상수도관이 매설된 하천제방, 고수부지, 도로상에 위치 표지 설치

- 기존 상수관로 위치표지 시행, 신규 공사시에 위치표지 설계 반영토록 의무화

□ 그동안 추진상황

○ 2007년까지 추진실적 : L=65km 완료

- 기존관로 20km, 신규관로 45km

○ 2008년 추진사항

- 기존관로: L=43.4km(아중체련공원,아중초교,강흥,도덕동일원)

- 신규관로: L=6.6km(우아동 관암․무능마을 일원)

□ 금후계획

○ 사업완료 -------------------------------  08. 12.20일한

- L=25km(인후초등학교 및 아중 롯데아파트부근 표지못 설치 670개소)

대형계량기실 확장 및 배관구조 개선사업

부적정하게 설치되어 있는 대형계량기실을 확장 또는 구조개선하여

계량기의 잦은 고장과 집단민원을 사전 예방하고 상수도 사용량의

정확한 검침 및 적정요금 부과하기 위함

□ 사업개요

○ 사 업 비 : 600백만원 (확장 420백만원, 구조개선 180백만원)

○ 사업기간 : 2007년 ~ 2010년(4년)

○ 사업내용 : 대형계량기실 확장 및 구조개선 136개소

- 계량기실 확장 42개소, 배관 구조개선 94개소

※ 80mm 이상 공동주택 주계량기실 : 266개소(완산165, 덕진 101)

□ 그동안 추진상황

○ 2007년도 까지 추진실적

- 사 업 비 : 150백만원

- 사 업 량 : 23개소 완료 (주계량기실 확장 13, 배관구조개선10)

○ 2008년도 추진사항

- 사 업 비 : 150백만원

- 사 업 량 : 20개소 (주계량기실 확장12, 배관구조개선 8)

- 현재까지 추진사항

․주계량기실 확장 12개소 완료 (서서학 대명아파트외 11개소)

․배관구조개선 7개소 완료 (평화주공2단지 외 6개소)

□ 금후계획

○ 잔여물량 11월말까지 마무리 추진(배관구조개선 1개소)

수질관리과  소관

『전국 최초』변방동지역 지하수 무료 수질검사

건강증진을 위한 시민 위주의 행정실현    ․․․․․  20

시민이 신뢰하는 깨끗한 수돗물 공급

수요자 중심의 『수돗물 품질검증』   ․․․․․․․․․․․․․  21

『국가공인 수질검사기관』 효율적 운영  ․․․․․․․․․․  22

맑고 깨끗한 사업장 시설물 유지관리  ․․․․․․․  23

『전국 최초』변방동지역 지하수 무료 수질검사

건강증진을 위한 시민 위주의 행정실현

○ 변방 자연마을의 지하수 음용세대에 대하여 무료로 수질검사를 실시

주민의 건강증진 및 편익을 제공하고 수질로 인한 불안감을 해소

하여 시민에게 다가가는 행정서비스를 제공하고자 함

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2007년~2009년(3년간)

○ 대    상 : 변방동(10개동) 80개 마을(2,650세대)

○ 수질검사 개요

- 검사항목 : 일반세균외 16개 항목(음용 적합ㆍ부적합 검사)

- 수 수 료 : 면제 (면제금액 : 76,000원/건)

□ 그동안 추진상황

○ 지하수 수질검사 대상 파악 및 해당 동과 업무협의 - ‘07.2월

- 대상지역(10개동) : 동서학동, 평화2동, 팔복동, 우아2동, 호성동,

송천1.2동, 동산동, 조촌동, 삼천3동

○ 동서학동 남고마을 등 759세대 완료   --------   ‘07.4월~12월

○ 조촌동 월곡마을 등 752세대 완료     --------   ‘08.1월~10월

□ 금후계획

○ 송천2동 은평마을 등 100여세대 수질검사 추진  ---  ‘08.12월

○ 부적합세대에 대한 수돗물 음용권장 및 정수기사용 등 홍보

- 시민이 신뢰하는 깨끗한 수돗물 공급 -

수요자 중심의『수돗물 품질검증』

○ 안심하고 마실 수 있는 수돗물 공급을 위해 노력하고 있으나

수돗물의 불신이 상존

○ 고객이 참여하여 수돗물 품질을 검증하고 신뢰성을 제고

□ 사업개요

○ 수돗물평가 소비자 모니터링제 실시

○ 수돗물 품질인증제 및 수돗물 품질보고서 발행 지속추진

○ 상수원수부터 수도꼭지까지 철저한 수질관리 및 검사

- 규정항목보다 강화한 수질검사실시(정수 55개항목 ⇒ 90개항목)

□ 그동안 추진상황

○ 환경부 주관 전국 정수장 평가결과『전주시 최우수 기관 선정』 - ‘08.4월

- 전국 166개소 정수장을 대상으로 운영․관리 실태 종합평가

○『도내최초』수돗물 품질인증제 추진 : 1,000개소

○ 수돗물 신뢰도 향상을 위한『수돗물 품질보고서』배부 : 200,000부

○ 수질평가위원회 및 민․관합동 수질검사 : 4회

상수도시설 투명성 제고 및 수돗물 평가

- 수돗물평가 소비자 모니터링요원 교육 및 평가 : 2회(132명)

- 수돗물 생산시설(정수장) 시민 방문 : 2,586명

○ 과학적인 수질관리․검사 및 품질고급화를 위한 연구과제 추진

- 주기(일․주․월별)적인 수질검사

- 환경부 주관 물종합연찬회 등 참석 연구자료 발표 : 3회

□ 금후계획

○ 수돗물평가 소비자 모니터링제 지속 추진

- 수돗물 품질 및 개선에 관한 의견 수렴 및 수돗물 이상시 연락

○ 수돗물 신뢰성 확보를 위한 대시민 홍보 강화

『국가공인 수질검사기관』 효율적 운영

○ 국가공인 수질검사기관의 효율적인 운영을 위하여 검사기관의 신뢰성      제고와 지속적인 홍보로 신속한 민원서비스 제공

□ 운영개요

○ 국립환경과학원『먹는물 수질검사기관 제33호』지정 - ‘00.7.25

○ 검사범위 : 먹는물(수돗물 등), 상수원수, 먹는샘물, 각종 지하수

○ 수 수 료 : 5,300원/건 ～ 283,900원/건

□ 그동안 추진상황

○ ‘08. 4월 환경부(국립환경과학원) 주관 전국 공인수질검사기관

수질분석능력(AQC) 및 현장 평가결과

⇒ 전주시가 전국에서 최고점수(100점) 획득

○ 한국수원공사 전문교육 이수 : 14명

○ 수수료 수입증대를 위한 시․군 방문 직접수거(670건)

※ 수수료세입 : 217,496천원(10월말 현재)

○ 변방지역(자연부락) 지하수 무료수질검사 : 752개소

□ 금후계획

○ 시․군 수질관리부서에 대한 지속적인 기관홍보 추진

- 고객의 불편사항 해소 및 만족도 제고를 위한 기관운영

○ 공인 수질검사기관 협의체를 통한 선진기관 정보교류 확대

- 선진검사기관 연구발전 및 분석 접목

맑고 깨끗한 사업장 시설물 유지관리

○ 수돗물생산의 효율적인 운영을 위하여 시설물의 개량 및 노후 된      시설물에 대해서 적기에 보수하여 안정적인 수돗물을 공급하고,

시민공개에 따른 공원 같은 상수도시설 사업장 환경조성

□ 사업개요

○ 사업범위 : 상수도사업장 17개소 (취수장 5, 정수장 4, 배수지 8)

○ 사업예산 : 1,188백만원

○ 사업내용

- 사업장 시설물 개선 및 유지관리    -----   37건  1,169백만원

- 취․정수장 배수지 사업장 환경정비   -----            19백만원

□ 그동안 추진상황

○ 상수도시설물에 대한 보수 등 추진완료 : 33건

- 기계장치 등 시설물 개선

◦ 전미취수장 전동구동장치 설치 등 9건

- 소규모 유지관리 수선

◦ 팔복․대성정수장 수전설비 보수 등 24건

○ 깨끗하고 공원같은 사업장 가꾸기(수목전지 및 제초작업)

- 취∙정수장 및 배수지 환경정비 완료

□ 금후계획

○ 상수도시설물 유지 보수 : 현장점검 실시, 12월초까지 마무리 추진

- 대성정수장 침전지 전동구동장치 설치

- 취․정수시설 소규모 수선 및 유지관리 등

하 수 과  소관

하수찌꺼기 처리시설 설치사업   ․․․․․․․․․․․․․  25

하수처리 편입구역 하수관거사업  ․․․․․․․․  26

환경사업소 생물반응조 덮개설치 사업   ․․․․․․․․․․  27

하수관거정비 민간투자(BTL)사업  ․․․․․․․  28

화산․덕진 처리구역 하수관거 정비사업  ․․․  29

농촌마을 하수도 정비사업    ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․  30

하수찌꺼기 처리시설 설치사업

○ 2012년부터 해양투기 금지정책에 따른 대책마련 필요

○ 하수찌꺼기의 안정적 처리로 자연환경 보전에 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 삼천동 안산․삼산마을

○ 사업규모 : 하수찌꺼기 처리시설 150톤/일

○ 사 업 비 : 24,000백만원(국비 12,000, 지방비 12,000)

○ 사업기간 : 2003 ~ 2011(9개년)

□ 그동안 추진상황

○ 기본 및 실시설계 용역 착수  ----------------  ‘03. 8.26

○ 용역 중지(공정율 81%)  --------------------  ‘04.12. 6

○ 종합 리싸이클링타운 입지선정(삼천동 안산․삼산마을) --  ‘08. 9.30

□ 문제점 및 대책

○ 고도처리에 따른 하수찌꺼기 발생량 증가 및 물가상승으로 소요사업비 증가에 따른 소요사업비 변경(140억 ⇒ 240억)

○ 각종 신기술이 개발 및 환경부 폐기물정책변화(폐기물 재활용)에 따른 입찰방법 및 공법 재검토 필요

□ 금후계획

○ 입지결정고시(폐촉법 10조)   ------------------   ‘08.11

○ 입찰방법 검토추진(턴키 및 기타공사)   ---------   ‘08.12

○ 공법결정   ------------------------------------   ‘09. 2

○ 기본 및 실시설계(입찰안내서) 용역완료   -------   ‘09. 6

○ 공사추진   ---------------------------    ‘09. 7~’11.10

하수처리 편입구역 하수관거사업

○ 도심하천 상류지역의 생활오수를 차집하여 하수처리장에 유입

○ 공공수역 수질오염 방지로 하천의 쾌적한 수변공간 제공

○ 농촌동 마을하수도 개량으로 시민 보건위생 증진

□ 사업개요

○ 위    치 : 평화동 장교마을 등 48개마을

○ 사 업 량 : 하수관거 설치  L=76.4km

○ 사 업 비 : 42,632백만원(국비 21,316, 지방비 21,316)

- ‘08년예산:1,519백만원(국비 361, 시비 1,056, 기금 102)

○ 사업기간 : 2007 ~ 2011(5개년)

□ 그동안 추진상황

○ 하수도정비 기본계획 변경 승인(환경부)   ------   ‘07. 7

○ 지방재정 투융자 심사완료(행정자치부)   -------   ‘07.10

○ 실시설계 용역 보완 완료  ---------------------    ‘08. 5

○ 행정절차이행(재원협의, 설계자문등)  ----------    ‘08. 8

○ 공사입찰(중복․전주천지구)  -----------------    ‘08. 9

○ 공사착공(진도 10%)  -------------------------    ‘08. 9

□ 금후계획

○ 중복․전주천지구 년차별 사업시행   ------    2009~2011

환경사업소 생물반응조 덮개설치 사업

○ 하수처리장에 적합한 악취방지 시설을 설치하여 인근 주민들의

악취민원 해소

○ 하수처리장이 혐오시설 이라는 인식에서 탈피, 환경보전 체험

교육장으로 활용

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 송천동2가 환경사업소 내

○ 사업규모 : 생물반응조 덮개 1식(26,000㎡중 혐기/무산소조 9,500㎡)

태양광 발전시설 설치 1식

○ 사 업 비 : 7,900백만원(생물반응조 5,500. 태양광 2,400)

○ 사업기간 : 2008 ~ 2010 (3개년)

□ 그동안 추진상황

○ 구리시외 4개소 하수처리장 견학  ---------     ‘07. 4~10

○ 용역과제 심의완료 -----------------------     ‘08. 2.25

○ 예산 투ㆍ융자심사 완료 ------------------     ‘08. 6. 4

○ 실시설계용역 발주 의뢰(조달청) ----------     ‘08. 7.15

○ 용역착공 --------------------------------     ‘08.10.24

□ 문제점 및 대책

○ 태양광 발전시설이 대체 에너지 개발 차원에서는 타당성이 있으나 경제성 검토 필요

⇨ 실시설계용역에서 태양광 발전시설 설치 타당성에 대해 면밀히 검토후 시행 여ㆍ부 결정

□ 금후계획

○ 실시설계용역 완료    -----------------------     ‘09. 2

○ 공사발주(총괄발주)   -----------------------     ‘09. 3

○ 공사완료    --------------------------------     ’10.12

하수관거정비 민간투자(BTL)사업

○ 민간자본 유치로 지역경기를 활성화 하고 정화조 폐쇄로 시민부담 경감

○ 오수관거 정비로 하천 수질개선 및 불명수를 차단 하수처리비 절감

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 일원(덕진, 아중, 중앙, 화산, 효자처리구역)

○ 사 업 량 : 하수관거 정비(우․오수 분리) L=127Km

○ 사 업 비 : 107,361백만원(민간자본)

○ 사업기간 : 2005 ~ 2011(7개년)

□ 그동안 추진상황

○ 업무 위․수탁 협약체결(환경부, 도, 시, 환경관리공단)  ----  ‘05. 6

○ 민간사업자 사업계획서 평가및 우선협상대상자 선정 -  ‘05.10

○ 협상 및 사업시행자 지정【전주아랫물길(주)】-----  ‘06. 4

○ 우선시공분 시설사업 실시계획 승인 및 착공 -----  ‘06. 4

○ 전체분 시설사업 실시계획 승인 및 착공 ---------  ‘07. 4

- ‘08.10월 현재 전체 127km 중 54km 완료(전체공정 43%)

□ 금후계획

○ 사업시행(‘08년계획 40㎞중 35㎞완료)    ----------    2008.12

- 송천1,2동 : 0.45㎞, 덕진,금암1동(종합경기장일대) : 11.86㎞,

- 인후2,금암2동(모래내시장일대) : 10.24㎞, 인후1동(안골광장일대) : 1.71㎞

- 인후2,우아2동(전주역앞일대) : 5.66㎞, 효자4동(우전초교일대) : 0.05㎞

- 서완산, 동완산, 서서학, 평화1동 일대 : 10.03㎞

○ 공사 준공         -----------------------------    2010. 4

○ 성과보증(13개월)        ------------------------    2011. 5

○ 사업시행자 관리운영(20년간)      ----------------    2031. 5

화산․덕진 처리구역 하수관거 정비사업

○ 하수관거 우․오수 분리를 통하여 민간위탁중인 하수처리비 절감

○ 전주천, 삼천 수질개선과 건물 정화조 폐쇄로 시민 보건위생 향상

□ 사업개요

○ 위    치 : 화산처리구역 1․4․7분구, 덕진처리구역 1분구

○ 사업규모 : 우․오수관거정비 L=66.9㎞

○ 사 업 비 : 40,785백만원(국비 20,392, 지방비 20,393)

- 연도별투자 : 기투자 35,079, ’08년 3,256, ’09년 2,450백만원

○ 사업기간 : 2004 ~ 2009(6개년)

□ 그동안 추진상황(전체공정 92%)

○ 하수관거 정비공사 착공     ----------------------  ‘04. 4

- 동서학동, 덕진동, 금암동 일대 L=34.0Km완료 --------  ‘06.12

- 효자택지, 호반촌, 6지구 일대 L=29.8Km 완료 ----  ‘07.12

○ ‘08년 국비 10억원 추가확보 등(3,256백만원) L=2.3㎞ -  ’08.11

․ 인후동 효성연립부근, 금암동 금암초교후문, 호성동 초포길

․ 평화동 편안2길 우수관거 개량 등

□ 금후계획

○ 전체사업 마무리      ----------------------    ‘09. 2~ 7

- 서서학동 거산황궁@, 흑석골주변 하수관거

농촌마을 하수도 정비사업

○ 농촌지역의 열악한 주거환경을 개선하여 주민생활 편익도모

○ 공공수역의 수질개선과 지역주민의 보건위생 향상에 기여

□ 사업개요

○ 사업규모 : 27개 지구(완산 7개지구, 덕진 20개지구)

- 가구수 : 3,506가구(완산 882가구, 덕진 2,624가구)

- 인구수 : 10,042명 (완산 2,334명, 덕진 7,708명)

○ 사 업 비 : 38,600백만원(국비 70%, 시비 30%)

○ 기    간 : 2005 ~ 2012(8개년)

□ 그동안 추진상황

○ 한절 등 12개지구(완산6, 덕진6) 완공(5,788백만원)  --  ’07.12

○ 조직개편에 따른 업무인계인수(주택과 ⇒ 하수과)  ----  ‘08. 3

○ 공덕, 추동지구 공사추진 완료(2,800백만원)  --------  ’08. 6

○ 아중ㆍ용계지구 공사착공(1,400백만원) 실적40%  -----  ‘08. 9

□ 금후계획

○ 아중ㆍ용계지구 공사추진 완료     --------------  ‘09. 3

○ 미 시설지구 년차별 추진     ------------------- ‘09~’12

- 지구수 : 12개지구(매암지구 등 12개지구)

- 마을수 : 47개마을(2,092가구  6,295명)

- 사업비 : 28,612백만원