제259회 전주시의회 제2차정례회

행정사무감사/도시건설위원회

2008년도

주요업무 추진상황 보고

건 설 교 통 국

보   고   순   서

□	일 반 현 황		-------	1
□	부 서 별 주 요 기 능		-------	2
□	기 본 현 황		-------	3
□	주요업무 추진상황
	○	도 시 과	-------	8
	○	교 통 과	-------	20
	○	주 택 과	-------	34
	○	도 로 안 전 과	-------	47
	○	차 량 등 록 사 업 소	-------	75

일   반   현   황

□ 기   구 : 4과 1사업소 24담당

													건설교통국
	도 시 과 (4 담 당)							교 통 과 (6 담 당)							주 택 과 (5 담 당)							도로안전과 (5 담 당)							차량등록 사 업 소 (4 담 당)
	도시행정							교통행정							주택행정							도로행정							등 록 1
	도시계획							대중교통							공동주택							도로시설							등 록 2
	도시시설							운 수							일반건축							도로정비							보험지도
	토지관리							교통지도							건축시설							민 방 위							건설기계
								교통시설							도심개발							재난관리
								교통정보

□ 정‧현원

과 별		총 계	일 반 직						계약	기능
			4급	5급	6급	7급	8급	9급
계	정 원	112	1	5	24	33	27	4	1	17
	현 원	112	1	5	24	55	8	1	1	17
도 시 과	정 원	19	1	1	4	6	4	2		1
	현 원	19	1	1	4	10	2			1
교 통 과	정 원	29		1	6	11	6		1	4
	현 원	29		1	6	14	2		1	5
주 택 과	정 원	19		1	5	7	6
	현 원	19		1	5	10	2	1
도로안전과	정 원	20		1	5	6	5			3
	현 원	20		1	5	10	1			3
차량등록 사 업 소	정 원	25		1	4	3	6	2		9
	현 원	25		1	4	11	1			8

부서별 주요기능

과 별	분 장 사 무
도 시 과	○ 전문건설업 및 건설기계사업자, 건설기계조종사 관리 ○ 기반시설부담금 부과․징수, 장기미집행 도시계획시설 매수 청구 ○ 도시계획결정․지적고시, 도시계획사업 시행인가 ○ 구도심 상가 활성화사업 및 전문특화거리 조성사업 추진 ○ 광장조성 등 도시시설사업 추진 ○ 새주소 부여사업 관리, 개별공시지가, 지적측량검사
교 통 과	○ 교통종합계획 수립 ○ 대중교통(버스, 택시, 화물) 업무 추진 ○ 자동차운송사업체(버스, 택시, 화물 등) 지도 감독 ○ 공영주차장 확충 및 관리, 교통영향평가업무 ○ 교통안전 시설물 설치 관리, 교통사고줄이기 사업 ○ 교통신호, 정보시설 설치 및 운영관리 ○ 지능형 교통체계(ITS) 설치 및 운영관리 ○ 첨단교통시설 사업, 전라선 복선화 사업
주 택 과	○ 저소득가구 전세자금 지원, 국민주택융자금 상환 ○ 주택건설사업계획승인, 사용검사, 주택정책 수립 ○ 건축인․허가, 건축심의, 건축조례 제․개정운영 ○ 공공용건축물 신축 등 건축공사 사업 ○ 서신복합문화센터 건립, 농촌지역 환경개선사업 ○ 재개발, 재건축, 도시주거환경개선사업
도로안전과	○ 도로부지관리, 도로안내표지판 설치관리 ○ 도로포장 보수지도, 자전거도로 시설, 가로등관리 ○ 신규도로개설 및 용지보상, 도시가로망 확충사업 ○ 가로환경 및 노점상 지도단속, 자전거이용 활성화 ○ 민방위, 재난방재 종합계획수립 및 재난재해대책 추진
차량등록 사 업 소	○ 자동차등록(전산입력, 자료관리 및 증명발급 등) ○ 자동차 및 건설기계 과태료 부과 ○ 건설기계등록(전산입력, 증명발급, 검사최고, 정비명령 등) ○ 무보험차량조사(손해배상보장법위반 과태료, 범칙금부과 등) ○ 자동차등록번호판 제작 관리

기   본   현   황

□ 도시계획 연혁

년 월 일	고 시 청	번 호	계획면적 (㎢)	목표 년도	계획인구	주 요 내 용
1938. 5. 9	조선총독부	403	19.76	1948	100,000	도시계획구역 결정(1차)
1966. 2.10	국토해양부	2,188	108.71	1983	550,000	도시계획 재정비(2차)
1970. 4.14	″	178	157.22	1986	500,000	도시계획 재정비(3차)
1973. 6.27	″	258	313.20			개발제한구역 216.4㎢ 지정
1974. 8.14	″	272	313.20			도시계획 재정비(4차)
1976. 3.27	″	37	313.20			도시계획 재정비(5차)
1986. 5. 8	″	206	313.20	1991	610,000	도시계획 재정비(6차)
1995. 6.29	전라북도	112	313.20	2001	860,000	도시계획 재정비(7차)
2003. 6.26	국토해양부	161	302.67			개발제한구역 225.4㎢해제
2005. 7.29	전라북도	186	313.18	2010	748,000	도시계획 재정비(8차)

□ 용도지역 ------------ 4개지역 304.53㎢ (비도시지역 8.65㎢제외)

구분	주 거 지 역			상업 지역	공 업 지 역				녹 지 지 역
	계	일 반 주 거	준 주거		계	전용공업	일반 공업	준 공업	계	생산 녹지	자연 녹지	보전 녹지
면적	31.933	31.576	0.357	4.114	6.202	1.444	4.090	0.668	262.281	40.722	109.217	112.342
비율 (%)	10.6	10.5	0.1	1.3	2.0	0.5	1.2	0.3	86.1	13.3	35.9	36.9

□ 용도지구  --------- 7개지구 21,390,127천㎡

지 구 명	개 소 수	면 적(㎡)	비 고
고 도	16	7,809,349
방 화	21	4,078,717
미 관	73	3,619,747
자연취락	250	5,213,095
경 관	7	413,140
시설보호	1	249,900
보 존	2	6,179

□ 토   지

(단위 : ㎢)

구분	합 계		대 지			임 야			기 타
	필지수	면적	필지수	면적	%	필지수	면적	%	필지수	면적	%
계	195,827	206.1	75,365	26.5	12.9	11,104	71.1	34.5	109,358	108.5	52.6

□ 건설기계조종사 면허현황

(단위 : 건)

계	불도우저	굴삭기	로우더	지게차	기중기	로울러	기 타 (3톤미만포함)
7,999	389	2,456	648	1,943	340	178	2,045

□ 운수업체(버  스)

(단위 : 개소/대)

구 분	계	시 내 버 스						시외버스	관광(전세)	비고
		계	호남	제일	풍남	신성	전일
대 수	1,371	401	75	92	44	97	93	482	총 488 - 23 개사 : 452대 - 영업소 : 4개사/36대

□ 운수업체(택  시)

(단위 : 대)

구 분	계	개인택시	회사택시	비 고
대 수	3,906	2,307	25개사/1,599대

□ 운수업체(화  물)

(단위 : 대)

구 분	계	개별사업자			일반사업자(5톤 이상)			비 고
		소계	용달	개별	소계	법인	개인
대 수	3,281	1,694	960	734	1,587	1,527 (77개회사)	60

□ 교통시설

(단위 : 개소, 개)

교차로	신호등(개소)			제어기	보행자 음 향 신호기	보행자 잔 여 표시기	교 통 표지판	차 선	횡단 보도	횡단보도 조명등
	소계	LED	전구
457	502	402	100	432	74	320	8,681	850개노선 L=407㎞ 차선L=2,085km	1,902	126개소 409등

□ 지능형 교통시설

(단위 : 개소, 개)

BIS 설비			검지기			가변정보 전광판				통신망			CCTV
안내 단말기 (BIT)	노변 기지국 (RSE)	장비	소계	신호용	구간용	소계	동영상	문자식	도형식	소계	임대망	자가망
137	223	분석 서버외 3	533	371	162	19	1	14	4	914	815	99	40

□ 주   택

(단위 : 세대)

구 분	계	단독주택	다세대 주택 동당660㎡미만	연립주택 (4층이하)	아파트 (5층이상)	가구수	주택보급율
주택수	188,462	47,410	2,477	4,153	134,422	165,673	112.19%
비율(%)	100	25.16	1.31	2.20	71.33

□ 도   로

(단위 : 개소, ㎞)

구 분	계		고속국도		일반국도		지 방 도		시 도
	노선	연 장	노선	연 장	노선	연 장	노선	연 장	노선	연 장
총연장	850	407	1	5	5	62	3	22	841	318
포장도	850	407	1	5	5	62	3	22	841	318
포장율 (%)		100		100		100		100		100

※ 도로율 : 16.28%(도로면적/시가지면적)

□ 교량 및 기타 시설물

(단위 : 개)

구분 계	교 량					육교 보도	지하 보도	지하차도	터널	비 고
	소계	고속 국도	시의 국도	지방도	시도
129	107		34	3	70	8	6	6	2

※ 장대교량 (삼례교 : 570m,  회포대교 : 707m)

□ 자동차등록

(단위 : 대)

합 계	승 용 차	승 합 차	화 물 차	특 수 차
218,233	168,389	12,509	36,956	379

□ 도시 주거환경정비 예정지구 현황

방 식	개소수	면 적 (㏊)	세 대 수
			계	현 재	증 가
계	62	434.9	60,311	25,154	35,157
주택재개발	25	205.7	33,771	11,216	22,555
주택재건축	10	33.8	7,008	4,665	2,343
주거환경개선	18	128.2	11,450	6,077	5,373
사업유형유보	8	63.4	7,909	3,196	4,713
도시환경정비	1	3.8	173		173

□ 특정․특화거리

거 리 명	구 간	연장(m)	지정일자	비고
계	7 개소	3,800
차이나거리	다가우체국 ➩ 다가파출소 ➩ 충경로	250	2003년 12월
웨딩거리	우체국 ➩ 다가파출소	550	“
약전거리	풍남문 ➩ 다가우체국	540	“
걷고싶은거리	오거리 ➩ 객사, 기린오피스텔➩팔달로 새하나백화점 ➩ 팔달로	830	“
영화거리	오거리➩전주시네마➩프리머스➩충경로	730	“
동문거리	팔달로 ➩ 동문사거리	300	“
공구거리	시청광장 ➩ 전주초교	600	“

도 시 과  소 관

ꊱ	전주 도시관리계획 전산화사업(UPIS)	----	9
ꊲ	장기미집행 도시계획시설 매수청구 추진	----	10
ꊳ	기반시설부담금 부과․징수	----	11
ꊴ	청소년의 거리 및 문화광장 조성사업	----	12
ꊵ	덕진 시민광장 조성사업	----	13
ꊶ	소규모 체육광장 조성사업	----	14
ꊷ	청소년거리 경관조형물 설치사업	----	15
	기린로 전자상가 활성화 사업	----	16
	아중저수지 주변 산책로 조성사업	----	17
	공공용지의 토지 현황조사를 통한 효율적 관리	----	18
	새주소의 법적주소 전환 추진	----	19

전주 도시관리계획 전산화사업(UPIS)

○ 70여년된 도시계획 자료를 국토해양부와 공동 DB구축

○ 토지의 활용 및 도시계획시설 내용의 인터넷 제공 시민 편익증진

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 도시관리계획구역 (A=206㎢)

○ 사업내용 : 도시계획 관련자료 DB구축

○ 사업기간 : 2008. 11 ～ 2009. 11

○ 사 업 비 : 500백만원 (국비 100,  시비 400)

- ‘07년 150(시비),  ’08년 250(국비100, 시비150) 미확보 100

□ 추진상황

○ 국토해양부 DB구축사업 시범대상지 선정(전북도:전주시,무주군) : ‘07.11.19

○ UPIS구축 업무협약 체결(국토해양부⇔전주시)    : ‘08. 4. 18

○ 표준시스템개발 및 DB구축사업 발주(국토해양부)   : ‘08. 10. 17

□ 금후계획

○ 사업 착수                     : 2008. 11

○ DB구축 운영장비 구입         : 2009. 10

○ 사업완료                      : 2009. 11

장기미집행 도시계획시설 매수청구 추진

○ 2001. 12. 31기준 도시계획시설로 10년이상된 “대지” 청구시 매수

○ 기간내 미 매수시 3층이하 단독주택 등 일부 건축허용 불가피

□ 매수청구 및 보상대상

○ 청구 현황

(단위:백만원)

년 도 별	건 수	면적(㎡)	매수추정액	비 고
계	172	33,152	24,825	‘08년 10월말
보상완료	142	27,434	20,490
보상대상	18	3,519	2,000	2009년도
	12	2,199	2,335	2010년이후～

□ 추진상황

○ 2008년도 보상대상 : 22건 5,330㎡ 2,216백만원

○ 보 상 완 료 : 19건 3,649㎡ 1,607백만원(보상 15건, 취하 4건)

○ 보상협의중 :  3건 1,681㎡  609백만원

□ 금후계획

○ 연내 전액 보상추진으로 적극적인 민원 해소

○ 2009년도 적극적인 예산확보 보상추진

- 18건 3,519㎡ 20억원 (‘05년～’07년도 매수청구분)

기반시설부담금 부과․징수

○ 기반시설의 설치, 정비 및 개량행위에 필요한 재원을 확보하여

○ 토지의 합리적인 이용을 촉진 시민의 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

○ 부 과 대 상 : 건축연면적 200㎡를 초과하는 건축물의 건축행위

○ 부 과 시 점 : 건축허가(신축 및 증축)를 받은 날

○ 납 부 기 일 : 2개월이내 부과, 2개월이내 납부

○ 부담금 배분 : 국가 30%, 전주시 70%(특별회계)

○ 부담금 사용 : 기반시설 설치 및 기반시설에 필요한 용지 확보

□ 추진상황

○ 기반시설부담금 부과  ------ 157건  779백만원 (현년도)

○ 기반시설부담금 징수  ------ 156건  910백만원

- 현 년 도            ------ 134건  649백만원 (징수율 83.3%)

- 과 년 도            ------  22건  261백만원 (징수율 25.1%)

○ 체 납 액             ------  58건 1,175백만원

- 납기 미도래 및 미준공 ----  39건   968백만원

- 고질체납             ---- 19건   207백만원

□ 금후계획

○ 건축물 사용승인 시 수납여부 확인 철저

○ 체납분 독촉장 발부 및 수납독려, 재산압류 등을 통한 강력 징수

○ 기반시설 부담구역 지정에 따른 기초 조사

청소년의 거리 및 문화광장 조성사업

○ 보행자 중심 가로환경 조성으로 구도심권 상징축으로 이미지 제고

○ 시민 휴식공간이나 집회 공간으로서 개방된 시민 휴식공간 조성

□ 사업개요

○ 위    치 : 노송광장 ∼ 오거리 문화광장 ∼영화의거리

○ 사업규모 : 광장조성 2개소, 거리조성 L=870m

- 노송광장～문화광장 L=170m (분수, 휴게시설, 자연형 계류)

- 문화광장∼영화의거리 L=700m (결절점 포장 6개소)

○ 사업기간 : 2006.  9～2009. 12 (4개년)

○ 총사업비 : 6,633백만원(문화광장 3,692  노송광장 1,141 거리조성 1,800)

- 기투자액 : 3,692백만원(오거리문화광장)

□ 추진상황

○ 문화광장 보상 및 지장물 철거 완료(2,628백만원): 2005. 12. 26

○ 기본계획 및 실시설계 완료(184)             : 2007.  3. 30

○ 오거리 문화광장 착공 및 준공(850)    : 2007. 5. 22～2008. 2. 27

○ 문화광장 편익시설 추진(30)          : 2008. 8. 4～9. 12

□ 금후계획

○ 청소년거리조성 추진(자연형계류, 산책로, 조경 등 /1,300) : 2009. 2～12

○ 영화의거리 결절점 포장(6개소/500)            : 2009. 5～12

○ 노송광장주변 산책로 및 광장내 분수 등(1,141) : 2010. 3～2011. 12

덕진 시민광장 조성사업

○ 도심속 휴식공간과 무질서하고 지저분한 광장을 정비 쾌적한 환경조성

○ 덕진공원과 연계한 광장 이미지 부각으로 인구유입 및 상가 활성화

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 덕진시민광장(9호광장)

○ 사업규모 : 6,414㎡

○ 사업내용 : 경관조경, 조형물 및 분수시설 등

○ 사업기간 : 2008 ～ 2009 (2개년)

○ 총사업비 : 700백만원 (‘08 예산액 700백만원)

□ 추진상황

○ 용역과제 심의 완료                        : 2006. 10. 23

○ 주민설명회 및 설문조사           : 2008. 5. 2～2008. 5. 23

○ 민․관협의회 개최(구상 4개“안” 의견수렴) : 2008. 8. 12

○ 용역발주 선진도시 검토 및 사전협의(아트폴리스과) : 2008. 8. 18～8. 30

○ 계약방식 방침 결정 및 용역 발주       : 2008. 10. 3～10. 9

□ 금후계획

○ 디자인 및 실시설계 용역 시행           : 2008. 11～2009.  3

○ 공사착공 및 준공                      : 2009.  4～2009. 12

소규모 체육광장 조성사업

○ 도시 주거 주변 근린공원 및 어린이공원에 체력 단련시설 추가 설치

○ 접근성이 용이한 공원내 운동시설을 설치 시민의 건강 증진 및 이용도 증대

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 관내 근린 및 어린이공원

○ 사업규모 : 89개 공원(근린 17, 어린이 72)

○ 사업내용 : 체련장 및 운동시설

○ 사업기간 : 2008 ～ 2010 (3개년)

○ 총사업비 : 1,500백만원 (‘08 예산액 : 550백만원)

□ 추진상황

○ 용역과제 심의 및 투․융자심사 완료         : 2006. 10

○ 공원별 실태조사 및 단계별 범위 결정    : 2007. 5～2008. 3

○ 용역 착공 및 공원조성계획 변경안 작성  : 2008. 5～6

○ 공원별 주민의견 수렴                   : 2008.  7.  9

○ 공원조성계획 변경 및 실시설계 완료     : 2008. 10. 31

□ 금후계획

○ 체육광장 조성공사 발주 및 착공         : 2008. 11

○ 체육광장 조성공사 완료                  : 2009.  2

○ 전체공사 완료                          : 2010. 12

○ 영화의 거리와 연계한 경관조형물 설치로 야간 볼거리 제공

○ 슬럼화 되어가는 구도심내 유동인구 증가로 상가 활성화

청소년거리 경관조형물 설치사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 고사동(구.전주백화점 ～ 기린오피스텔)

○ 사업내용 : 경관조형물설치 L=250m, B=8m

○ 사업기간 : 2007 ～ 2008 (2개년)

○ 사 업 비 : 1,000백만원 (‘07 예산액)

□ 추진상황

○ 선정위원회 개최(선정업체 이노셈코리아)  : 2007. 9.  6

○ 디자인변경 최종(안)작성 및 선정위 서면 자문 : 2008. 1～4. 24

○ 현장측량 및 실시설계 완료             : 2008. 4. 30～6. 10

○ 실시설계 자문 및 지적사항 보완          : 2008. 6. 17～7

○ 경관조형물 착공 및 준공              : 2008. 7. 23～10. 30

□ 금후계획

○ 시범운영 및 점등식 등                : 2008. 10. 31～11. 20

○ 시설물유지관리 계획 수립(상가협의회)추진 : 2008. 11

기린로 전자상가 활성화 사업

○ 전자상가 매출증가로 구도심 활성화 및 빈 점포 입점 유도

○ 낙후된 몰 시설 정비로 도시 이미지 제고 및 안전사고 예방

□ 사업개요

○ 위    치 : 구 한진고속 ～ 안덕로(기린로 전자상가)

○ 사업내용 : 특화거리 조성 L=350m, B=8.5m

○ 사업기간 : 2007 ～ 2009 (3개년)

○ 사 업 비 : 860백만원 (‘07년 60,  ’08년 도비 240․시비 560)

□ 추진상황

○ 몰 설치 및 기부체납(건축허가조건)        : 1992. 1～5

○ 용역과제 심의 및 실시설계 용역 착수    : 2007. 5. 25～9.  7

○ 전북도 디자인 공모신청 및 우수작 선정    : 2008. 1. 14～4. 20

○ 관련부서 협의 및 실시설계 반영         : 2008. 4. 25～6. 20

○ 실시설계 반영 가능한 디자인(안) 아트폴리스 자문 : 2008. 6～10

○ 실시설계 완료                          : 2008. 11. 12

□ 금후계획

○ 공사 발주 및 착공                       : 2008. 11～12

○ 공사 준공                               : 2009.  6

아중저수지 주변 산책로 조성사업

○ 1976년 유원지 결정 이후 2005년 해제시까지 미개발로 소외

○ 접근성이 용이한 산책로를 조성 수려한 자연경관 및 휴식 공간 제공

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 우아동1가 아중저수지 주변 일원

○ 사업내용 : 산책로 조성, 수변데크, 쌈지공원 등 설치

○ 사업규모 : 200,000㎡

○ 사업기간 : 2008 ～ 2009 (2개년)

○ 사 업 비 : 980백만원

□ 추진상황

○ 시정 정책조정회의 및 용역 발주 검토      : 2008.  5.  8

○ 기본 및 실시설계 용역 발주 및 착수       : 2008.  7～8. 5

○ 아중저수지 목적외 사용협의(농촌공사)     : 2008. 10. 16

○ 기본계획(안) 아트폴리스 자문 및 보완     : 2008. 10～11

□ 금후계획

○ 주민의견 수렴 및 설계 반영                 : 2008. 11

○ 실시설계 완료 및 공사 착공                : 2008. 11～12

○ 공사완료                                    : 2009.  6

공공용지의 토지 현황조사를 통한 효율적 관리

○ 공공용지의 지목변경ㆍ합병정리 누락이 많고 실제현황 불일치로

○ 현황을 조사 정리하여 효율적 재산관리와 지적공부의 공신력 제고

□ 사업개요

○ 조사대상 : 도로, 하천, 제방, 공원 등 공공시설 부지

- 도로 : 3,033개노선(광대로 55, 중로 269, 소로 2,709)

- 하천․제방 : 21개노선(국가하천 3, 지방하천 18)

- 공원 : 128개소(근린공원 31, 어린이공원 97)

○ 추진기간 : 2007 ～ 2008 (2개년)

□ 추진상황

○ 대상토지 조사 : 서낭로 외 2,917개 노선 조사

- 정리대상 : 126개 노선 5,260필지(지목변경 2,116  합병 3,144)

- 소유권정리 대상 : 204필지

○ 지적공부정리 완료 : 3,931필지(지목변경 2,008  합병 1,923)

○ 지적공부 불일치사항 정리 : 167필지(도면 151, 소유권 사항 16)

□ 금후계획

○ 현지조사 도면작성 및 지적공부대사, 정리대상 토지조서 작성

○ 정리대상토지 현지이용 현황조사 및 등기부 대사

○ 지적공부 정리 및 소유권 정리대상 토지조서 작성 통보

새주소의 법적주소 전환 추진

○ 법적주소 전환에 따른 시설물 유지관리와 홍보강화

○ 시민인지도 제고 및 활성화 정착 도모로 차질 없는 업무 추진

□ 사업개요

○ 새주소(도로명+건물번호)를 2011년까지 법적주소로 전환 완료

- 지번주소와 새주소 병행 사용, 2012년부터 새주소만 사용

○ 도로구간 : 2,546개 노선(주간선 29, 보조간선 14, 소로 2,269, 골목길 234)

○ 시설물 : 도로명판 5,404개, 건물번호판 61,601개

○ 사업비 : 50백만원

- 새주소 홍보 및 인터넷 웹서버 교체

□ 추진상황

○ 새주소(도로명주소) 사업 추진             : 1999. 1～2002. 5

○ 전주시 도로명주소 등 표기에 관한 조례 제정 : 2008. 2. 18

○ 전주시 새주소위원회 구성 운영              : 2008. 5.  7

- 한옥마을 도로명 및 노선정비(안) 확정   : 2008. 6. 19

- 새주소정비(안) 재정비 여부 심의 가결   : 2008. 9.  4

□ 금후계획

○ 불합리한 도로명 및 노선 재조사 정비      : ‘08. 11～’09. 12

○ 법적주소 체계의 계획 기간내 전환 구축(지번주소 ⇨ 새주소)

○ 시민 인지도 제고 및 활용을 위한 각종 홍보매체를 통한 지속 홍보

교 통 과  소 관

ꊱ	시와 그림이 어우러진 정감 있는 유개승강장 조성	----	21
ꊲ	시내버스 유개승강장 태양광 조명설치	----	22
ꊳ	공영주차장 확충	----	23
ꊴ	만남의 광장 조성	----	24
ꊵ	교통약자를 위한 저상버스 확대 도입	----	25
ꊶ	교통혼잡지역 예고제 시행	----	26
ꊷ	레드존 및 눈높이 주차금지 표지판 설치	----	27
ꊸ	어린이 보호구역 개선사업	----	28
ꊹ	교통사고 잦은지점 개선사업	----	29
	LED 교통신호등 보급사업	----	30
	차선도색(재도색) 사업	----	31
	신호등 개선 사업	----	32
	교통정보․신호시스템 효율적 운영 관리	----	33

시와 그림이 어우러진 정감 있는 유개승강장 조성

○ 시민들이 대중교통을 이용하면서 정서적인 함양과 작은 삶의

여유를 찾을 수 있는 아늑한 유개승강장 조성

○ 시와 그림을 설치, 아름다운 명품도시(Art Polis)로써의 전주 이미지 제고

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 시와 그림이 어우러진 정감 있는 유개승강장 조성

○ 사 업 량 : ‘시와 그림’ 설치 60여개소

○ 사 업 비 : 40백만원

□ 추진상황

○ 전주시 문인협회와의 면담	: 2008.  8

○ 전북연고 문인대상 작품 수집(60여편)	: 2008.  9

○ ‘시와그림’ 디자인 시안작성(교통과)	: 2008.  9

○ ‘시와그림’ 디자인 시안자문(아트폴리스과)	: 2008. 10

○ 사업시행을 위한 계약	: 2008. 11

□ 금후계획

○ 시와 그림이 있는 유개승강장 조성          : 2008. 11∼12

- 시내버스 이용시민이 많고 노후 홍보물 게첨 승강장 우선 설치

시내버스 유개승강장 태양광 조명 설치

사람의 왕래가 적고 어두운 도심 외곽 가로등 미설치 지역 시내버스

승강장에 고유가 시대를 맞아 대체 에너지인 태양광을 이용한 조명등을

설치, 범죄 및 안전사고를 미연에 방지하고 선진 교통문화 정착

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 시내버스 유개승강장 태양광 조명 설치

○ 사 업 량 : 태양광 집열판 설치 4개소(시범설치)

○ 사 업 비 : 8백만원

□ 추진상황

○ 승강장 조도개선(태양광)공사 착공	: 2008.  6. 26

○ 태양광 조명시설 설치(4개소)준공	: 2008.  7.  9

- 완산구 2개소 (평화2동 학전마을, 동서학동 덕산마을)

- 덕진구 2개소 (원만성, 동산동 대한적십자사 맞은편)

□ 금후계획

○ 사업효과 분석 후 년차별 계획 수립 확대 시행

□ 기대효과

○ 고유가 시대를 맞아 대체 에너지로써의 대표적 사례

○ 친환경에너지인 태양광을 이용한 승강장에 야간 조명 설치로

도시이미지 제고

공영주차장 확충

도심지 및 주택가 주차난이 심각한 지역에 공영주차장을 조성하여

주차로 인한 주민불편 해소하고 교통소통에 기여

□ 사업개요

○ 조성규모 : 2개소 280면정도(삼천2동 200면, 인후3동 80면)

○ 사업기간 : 2006 ～ 2009 (4개년)

○ 총사업비 : 5,100백만원

▸ 삼천2동 공영 주차장 조성 (삼천동1가 632-5외 3필지, 1,950㎡)

- 3,500백만원 (보상 1,500, 공사 1,900, 기타 100) / 200면

▸ 인후3동 공영주차장 조성 (인후동1가 907-1, 2,454㎡)

- 1,600백만원 (보상 1,300, 공사비 등 300) / 80면

□ 추진상황

○ 주차수급실태조사 용역 실시                : 2005. 11～2006. 7

(1순위 : 삼천2동, 2순위 : 인후3동, 3순위 : 중화산동, 4순위 : 서신동 )

○ 삼천2동 공영주차장 조성

- 조성부지 매입 (‘07. 9. 6) ⇨ 도시계획시설결정 완료(‘08. 9. 5)

○ 인후3동 공영주차장 조성

- 조성부지 선정 및 국유지 매수신청         : 2008.  6. 25

※ 기획재정부 소유의 국유지로서 주차장 부지  2008. 11～12월초 승인 예정

□ 금후계획

○ 삼천2동 공영주차장 조성

- 실시설계 용역완료 및 공사착공(‘08. 11) ⇨ 공사 준공(‘09. 6)

○ 인후3동 공영주차장 조성

- 부지매입 (‘08. 12) ⇨ 실시설계 완료 및 공사착공(‘09. 3) ⇨ 공사준공(‘09. 10)

만남의 광장 조성

○ 카풀을 이용하여 타 지역으로 출퇴근하는 직장인에게 안전한

주차 공간 제공

○ 전주를 찾는 방문객에게 만남의 장소 및 휴식 공간 제공

□ 사업개요

○ 위    치 : 5개소(동․서․남․북 방향)

- 남원․임실, 봉동․고산, 무․진․장, 정읍․고창, 군산․익산방면

○ 사업기간 : 2006 ～ 2009 (4개년)

○ 총사업비 : 3,000백만원

□ 추진상황

○ 남원․임실 방면(색장동) 조성공사 완료(68면)     : 2006. 10

○ 군산․익산 방면(총화탑 인근) 조성공사 완료(52면)      : 2006. 11

(어린이교통공원 주차장 활용, 주차장 표시판 설치 완료 : 2007.12)

○ 봉동․고산 방면(호성동) 조성공사 완료(30면)     : 2007.  2

○ 무․진․장 방면 (덕진구 산정동 산정충전소 옆, 2,802㎡-75면)

- 도시계획시설결정 및 실시설계 용역   : 2007.  9～2008.  7

- 공사착공                                      : 2008.  8

□ 금후계획

○ 무진장 방면

- 공사 준공 예정                              : 2008. 12

○ 정읍․고창 방면

- 역사박물관 주차장확보를 위한 토지매입(전통문화과) 후

만남의 광장조성 공사 시행

교통약자를 위한 저상버스 확대 도입

장애인, 노약자 등 교통약자가 안전하고 편리하게 이동할 수 있는

이동권 보장으로 교통약자의 사회적 참여와 복지증진

□ 사업개요

○ 사업규모 : 교통약자를 위한 저상버스 2대 도입

○ 운행노선 : 교통약자 집단 거주지역, 종합병원, 터미널, 역등을 경유하고 노면이 평탄한 기존 노선 투입

○ 사 업 비 : 360백만원(국비 100, 도비 50, 시비 50, 자부담 160)

□ 추진상황

○ 교통약자를 위한 특별교통수단 운행           : 2001년부터

- 운행차량 : 버스 - 3대(저상-1대, 특장-1대, 셔틀-1대)

장애인 콜택시 : 6대

- 운영방법 : 민간위탁(전북곰두리 봉사대)

○ 교통약자 이동편의 증진계획 수립을 위한 용역과제 심의  : 2008.  6.  2

○ 저상버스 도입 계약(2대)                     : 2008. 10. 20

□ 금후계획

○ 교통약자 이동편의증진 계획수립 연구용역 시행 : 2009.  2

○ 지방 도시교통정책 심의요구(시 ⇨ 전북도)      : 2009.  8

○ 교통약자 이동편의 증진계획 고시              : 2009.  9

교통 혼잡지역 예고제 시행

각종 공사 및 행사 등으로 인한 교통 혼잡지역을 시민들에게 사전  예고하여

차량 운전자의 불만해소와 교통편의를 제공하고자 함

□ 사업개요

○ 운영내용

- 각종 행사개최로 인한 교통혼잡 및 통제지역, 차량 우회 안내

- 도로공사 및 상·하수도 공사 등으로 인한 교통통제사항 안내

○ 운영방법

- 교통시설 전광판, 인터넷 홈페이지 등을 이용 안내 및 홍보

- 희망시민, 버스, 택시, 화물 운수종사자에게 SMS문자 송신

○ 사 업 비 : 10백만원

□ 추진상황

○ 교통혼잡지역 사전예고 수신 희망자 파악        : 2008.  2

- 8,400명(의원․기자 60 ,버스 721, 택시 3,651,화물 1,464,일반시민 2,504)

○ 각종 공사 및 행사계획 일정 등 자료 수집       : 2008.  2

○ 교통혼잡지역 예고 본격 시행                  : 2008.  3

- 10월현재 25회 시행 (210,000명 - 행사 19, 공사 6)

□ 금후계획

○ 2008년 12월말까지 만족도 여론수렴 후 수신대상자 확대 시행

레드존 및 눈높이 주차금지 표지판 설치

○ 버스베이내 불법 주․정차로 교통흐름 방해 및 도로기능 저하

○ 레드존 및 운전자 눈높이에 주차금지 표지판 설치로 교통소통 기여

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2008. 2 ～ 6

○ 설치장소 : 기린로(대우빌딩 앞 등 5개소)

○ 사업규모 : L = 399m,  B = 3m

○ 사업내용 : 버스베이 포장, 눈높이 주차금지 표지판설치

- 레드존 설치 : 버스베이 포장(시인성 포장, 미끄럼 방지시설 포함)

- 눈높이 주차금지 표지판 설치

ꠞ 절대주차금지  - 남색 바탕에 노란색 글씨

ꠡ 견인구역      - 청록색 바탕에 빨강색 글씨

ꠤ 버스승강장    - 주황색 바탕에 파랑색 글씨

○ 총사업비 : 31백만원(시비)

□ 추진상황

○ 대상구역 현지실사                    : 2008.  2

○ 경찰서 협의                          : 2008.  3

○ 설계 및 발주                         : 2008.  4

○ 공사 완료                             : 2008.  6. 10

□ 금후계획

○ 레드존 내 질서 확립을 위한 지속적인 단속 강화로 기초질서 확립

- 불법 주․정차, 시내버스 정류장 질서 문란행위

○ 2009년 장승로 설치 계획

어린이 보호구역 개선사업

교통약자인 어린이를 교통안전 사고로 부터 보호하기 위하여

초등학교, 어린이집 등 보육시설(100인 이상) 주변 교통 안전시설 보강

□ 사업개요

○ 어린이 보호구역 지정현황 : 총 114개소

- 초등학교 67개교. 특수학교 5개교. 유치원 5개소. 보육시설 37개소

○ 사업 단계별 규모                          (단위 : 백만원)

구 분	사업기간	사업규모	사 업 비	비 고
1 단 계	2003～2007	59개교	9,645
2 단 계	2008～2012	55개교	8,340

○ 2008년 계획

- 사업규모 : 교대부속초교외 16개교, 1단계 초등학교 보완 6개교

- 사업내용 : 인도설치, 방호울타리, 시인성 확보시설, 표지판시설

- 사 업 비 : 3,824백만원(국비 1,912, 시비 1,912)

□ 추진상황

○ 1단계 유지관리 정비 및 여울초교 외 6개교 개선 완료

○ 개선사업 실시설계 용역                     : 2008.  3

○ 스쿨죤 공청회 및 의견수렴                  : 2008.  6～8

○ 실시설계 용역완료 및 설계심사              : 2008.  9

○ 완산 서초교 외 15개교 착공                : 2008.  6～10

□ 금후계획

○ 완산서초교 외 15개교 개선사업 완료예정     : 2008. 12

교통사고 잦은 지점 개선사업

년간 중대형 교통사고 5건 이상 발생장소 사고원인을 분석

사고 재 발생 방지를 위한 개선사업

□ 사업개요

○ 사업내용 : 인도축소 및 우회전차로 확보, 교통섬설치 및 안전

시설 보강 등 교차로 구조개선

○ 사업규모 : 인후동 안골광장 옆 외 7개소

○ 사업기간 : 2008. 3 ～ 12

○ 사 업 비 : 432백만원 (국비 116, 시비 316)

□ 추진상황

○ 주민설명회(인후1동 주민센터) 개최             : 2008.  5. 21

○ 유관기관 간담회(교통단체, 시민단체 등 )개최    : 2008.  7. 29

○ 실시설계 용역완료                         : 2008.  9. 10

○ 공사착공                                  : 2008. 10. 13

□ 금후계획

○ 교통안전시설 보강 및 개선공사 완료 예정   : 2008.12

LED 교통신호등 보급사업

○ 전력소비 및 고장발생이 많은 전구식 신호등을 LED신호등으로 교체

- 고장 발생 70% 감소로 유지보수비 절감 및 전력료 85% 절감

- 태양빛에 의한 난반사 현상 해소로 착시현상 감소 (사고25% 감소)

□ 사업개요

○ 사업내용 : 전구식 신호등 → LED신호등 교체

○ 사업규모 : 49개 교차로

○ 사업기간 : 2008. 10 ～ 12

○ 사 업 비 : 286백만원 (국비 200, 시비  86)

□ 추진상황

○ LED 신호등 교체현황

- 총 교체대상 : 352개 교차로

- 2002～2007년도까지 226개 교차로 완료(64%)

○ 우선사업 대상지 경찰과 합동조사 선정(49개교차로)  : 2008.  6

○ 실시설계 사전심사(일상감사)                  : 2008.  9

○ 교체공사 발주 의뢰                          : 2008. 10

□ 금후계획

○ 교체공사 착공                               : 2008. 11

○ 교체공사 준공                               : 2008. 12

차선 도색(재도색) 사업

차선 재 도색 시기 기준에 의한 사후 유지관리 철저로 교통사고

방지 및 도로 미관 향상

□ 사업개요

○ 차선현황 : 850개노선, 차선길이 2,035km, 횡단보도 1,902개

○ 사업내용 : 주요도로 퇴색된 차선 재 도색 및 차선지우기 등

○ 사업규모 : 20개노선, 차선길이 : 425km, 횡단보도 500개

○ 사업기간 : 2008. 3 ～ 12

○ 사 업 비 : 1,500백만원 (도색 1,350  지우기 150)

□ 추진상황

○ 차선도색 및 미끄럼방지시설(1차분/9억)완료      : 2008.  3～9

○ 차선도색 및 미끄럼방지시설(2차분/6억)공사착공  : 2008. 10

○ 경찰합동 일제조사 및 민원지역 등 62개 구간 재 도색

□ 문제점 및 대책

○ 주요도로의 차선 재도색 주기는 1년이나 예산부족으로 2～3년

(이면도로 4～6년)주기로 재 도색

⇨ 충분한 예산확보로 재 도색 주기를 단축하여 쾌적한 교통 및 도시

환경 조성과 교통사고 예방

□ 금후계획

○ 민원발생 및 차선 퇴색구간 재 도색         : 2008. 12

신호등 개선 사업

○ 기존의 획일화된 형태를 벗어나 천년전주다운 이미지로 새롭게

디자인하여 신호등 설치 - 도시경관과 전주이미지 향상

□ 사업개요

○ 사업내용 : 새롭게 디자인한 안정감 있는 신호등 시설

교통신호제어기 기초카바와 차광막 개선

○ 사업대상 : 신설 또는 노후 교체 신호등 외 제어기

○ 사업규모 : 신호등 7개 교차로

교통신호제어기 300개소

○ 사업기간 : 2008년

○ 사 업 비 : 396백만원

□ 추진상황

○ 아트폴리스 디자인 협의              : 2008. 10. 22

○ 사업설계서 일상감사 의뢰            : 2008. 10. 20

□ 문제점 및 대책

○ 기존 신호등은 단순한 철주에 3～8개의 철선으로 부착대를 지지

하는 획일화 된 형태로 미관이 좋지 않고 운전자에게 불안감을 줌

⇨ 예술도시다운 이미지로 디자인하여 안정감 있는 신호등 시설

□ 금후계획

○ 신호등 개선사업 발주               : 2008. 11

○ 신호등 납품 및 설치 완료           : 2008. 11～2009. 2

교통정보․신호시스템 효율적 운영관리

○ 교통정보․신호 시설물의 증가 및 장비 노후화로 장애 발생

- 전문업체 용역관리

○ 신속․정확한 교통정보 제공 및 효율적 운영으로 시민 편익 증진

□ 사업개요

○ 사업내용

- 지능형교통체계(ITS) 유지보수 및 교통신호 DB구축 및 운영 용역

- 장비구입 보강,교체, 보수공사 등 자체사업

○ 사업비 : 600백만원

□ 추진상황

○ 지능형교통체계 유지보수 용역     : 2008. 4. 11～2009. 4. 10

- 사업비 : 414백만원 (용역업체 : (주)대한신호)

○ 교통신호체계 운영관리 용역       : 2008. 4. 22～2009. 4. 21

- 사업비 : 90백만원 (용역업체 : 도로교통공단)

○ 관내교차로 신호운영 최적화, 교통량조사

- 16개 가로축 주행조사 : 1차(5. 19～6. 10),  2차(10. 13∼11. 3)

- 97개 교차로 교통량 조사(정시 73개소, 수시 24개소)

- 교통신호체계 전면개편(9. 24～10. 9) : 백제로, 화산로 등 110개 교차로

○ 버스정보시스템 일제정비 및 정확도조사

- 일제정비 : 시내버스 400대, 버스도착 안내시스템 136개소

- 정확도 조사(50개소) : 상반기(5. 1～6. 9), 하반기(10. 20～11. 14)

□ 금후계획

○ 주요 가로축 주행조사 : 3차(2008. 12월), 4차(2009. 3월)

주 택 과  소 관

ꊱ	저소득가구 전세자금 지원	----	35
ꊲ	국민주택 융자금 상환	----	36
ꊳ	학교용지부담금 환급 시행	----	37
ꊴ	노후 공동주택 관리비용 지원	----	38
ꊵ	공동주택 분양가 상한제 실시	----	39
ꊶ	공동주택 품질검수단 구성․운영	----	40
	폐․공가 정비사업	----	41
	공사 중 방치건축물 울타리 설치	----	42
	서신복합문화센터 건립	----	43
	농촌마을환경개선(숙원)사업	----	44
	주택재개발․재건축사업 추진	----	45
	2단계 주거환경개선사업	----	46

저소득가구 전세자금 지원

도시 저소득 무주택 세대주 및 소년소녀가정, 교통사고 유자녀 가정

등에 국민주택기금으로 저리의 전세자금을 지원 사회 취약계층의 주거

생활안정 도모

□ 법적근거

○ 국민주택기금운용 및 관리규정(국토해양부)

○ 저소득가구 전세자금지원 기준(국토해양부)

□ 지원대상

○ 소년소녀(교통사고 유자녀) 가정 및 20세이상 무주택 세대주로서

가구당 월평균소득이 국민기초생활수급자기준 2배 이내인 가정

- 대출한도 : 세대당 2,800만원, 3자녀 이상 3,500만원 이하

- 소년소녀(교통사고유자녀)가정 : 20세 이하 무이자, 초과 전세자금이자 적용

- 만20세이상 무주택 세대주 : 15년 원리금 균등 분할상환(연 2%)

- 취급은행(5) : 우리은행, 농협중앙회, 하나은행, 신한은행, 기업은행

※ 지원제외 : 부동산 또는 중형이상 자동차 소유자, 은행신용정보관리 대상자

□ 추진상황

○ 지원 추천사항(2008. 10월말)         : 169건  2,903백만원

- 소년소녀 및 교통사고 유자녀       :  19건   442백만원

- 무주택세대주(20세이상)             : 117건  1,796백만원

- 연장 신청                          :  33건   665백만원

○ 시정홍보(미래를 여는 천년전주)      : 2008. 5월, 10월호에 게재

□ 금후계획

○ 전세자금대출 희망자에게 적극홍보 및 지원 알선

○ 연대보증인 또는 임대인의 임차보증금 반환확약서로 대출 가능 홍보

○ 전세자금 대출신청서 접수 후 처리기일 단축으로 신속한 민원처리

국민주택 융자금 상환

무주택 서민을 위하여 우리시가 국민은행(주택은행)에서 차입․

융자한 장기 저리의 융자금이 적기에 상환되지 않아 손실이

예상되어 강력한 징수 및 상환대책을 수립 추진

□ 국민주택 융자금 현황

○ 융자금 차입

- 차입액 : 3,467세대  21,160백만원(1977년～1988년)

- 조  건 : 1년거치 19년 체증식 분할 상환(약정이자5%, 연체이자10%)

※ 상환액 : 3,394세대 19,689백만원(93.1%상환)

○ 세 대 당 : 550 ～ 750만원

○ 융자조건 : 전주시 거주 무주택 세대주

□ 추진상황

○ 국민주택융자금 상환(2008. 10월말)       : 51세대 368백만원

- 고액 및 고질 체납자 경매실시(전주지방법원)    : 30세대 413백만원

⇨ 진행중 6세대/94백만원,     완 료 24세대/319백만원

○ 전주시소유 국민주택 매각 실시             :  7세대 269백만원

⇨ 매각 완료 1세대, 명도소송 2세대, 추진중 4세대

□ 은행과 시의 차액발생

(단위 : 백만원)

구 분	미 상 환 액				비 고
	합 계	원 금	약정이자	연체이자
국민은행	2,070	1,471	39	560	상환금액
시	982	264	150	568	회수금액
차 액	1,088	1,207	△111	△8

※ 차액발생사유 : 경매처분 등으로 원금, 이자 손실 발생

□ 금후계획

○ 장기 체납자에 대한 독촉, 야간집중방문 독려, 경매처분 등

○ 고액 및 고질체납자 경매 등 법적조치 의뢰 : 19세대 432백만원

⇨ 명도소송 : 3세대 135백만원, 경매처분 : 16세대 297백만원

○ 연체이자 10%의 고금리로서 상환부담금 가중으로 시재정 악화

⇨ 지방채 발행(전라북도 지역개발공채, 연이율 4.0%정도) : 20억원

학교용지부담금 환급 시행

학교용지부담금 환급등에 관한 특별법 및 같은법 시행령이 공포

(2008. 10. 13)됨에 따라 구 특례법에 의해 학교용지부담금을

납부한 자에게 환급될 수 있도록 추진에 철저를 기하고자 함

□ 법적근거

○ 학교용지부담금 환급등에 관한 특별법 및 같은법 시행령

○ 전라북도 학교용지부담금 환급등에 관한 규정(2008.10.31발령)

□ 징수현황 및 환급대상

○ 징수 현황(2004～2005)            : 2,370건   3,603백만원

○ 기  환 급(2004～2005)            :  858건   1,235백만원

○ 환급 대상                       : 1,512건   2,368백만원(원금)

- 환급액(국비) : 2,846백만원 (원금 2,368  이자 478)

※ 구 특례법에 의해 학교용지부담금을 납부한 자

○ 환급대상 지역 : 관내 7개 아파트

- 진흥더블파크, 포스코, 엘드수목토, 송정써미트, 세창, 엘지자이, 우성해오름

□ 추진상황

○ 환급대상자 명단 및 주소지 파악           : 2008.  8

○ 환급대상 금액 확정(이자포함 연5%)        : 2008.  9

○ 환급계획 공고(시 인터넷 홈페이지, 시보게재)    : 2008. 10. 31

□ 금후계획

○ 환급통지서 안내문 발송 및 신청서 접수     : 2008. 11

○ 환급 시행(신청 이후 6개월 이내)            : 2009.  2～3월경

노후 공동주택 관리비용 지원

노후 공동주택은 주거환경이 열악하고 자체관리 능력이 부족

하므로 관리비용의 일부를 지원하여 주거환경개선 도모

□ 사업개요

○ 현    황 : 477단지 137,648세대 (‘08. 10월말기준)

	‘05～07년지원 : 83단지, 11,908세대(782백만원)
	‘08년 지원 : 51단지, 6,365세대(500백만원)
	금 후 대 상 : 131단지 23,073세대(1,310백만원 소요)

○ 사업대상 : 265단지,  41,346세대 (15년이상 공동주택)

○ 지원금액 : 사업비의 70%이하로서 1,000만원이하

□ 추진상황

○ 노후 공동주택 관리지원 주택조례 제정         : 2005. 6. 24

○ 기존 지원 실적 : 83개단지, 782백만원

- 년도별 지원 : ‘05년 198, ’06년 286, ‘07년 298백만원

○ 노후 공동주택 관리지원 대상 확대 조례 개정   : 2007. 10. 5

○ 공동주택지원 심사위원회 구성                 : 2007. 10. 9

○ 2008년 지원 : 2회 (4월, 8월)

- 95개단지 신청중 51단지 6,365세대(500백만원)

□ 금후계획

○ 지원대상 단지 신청 홍보 및 확정            : 2009.  4

- 공동주택 지원심사위원회 심사를 거쳐 공정하게 관리비용 지원

○ ‘09년 지원단지 사업준공 및 정산

공동주택 분양가 상한제 실시

공동주택 분양가격을 분양가 심사위원회에서 객관적이고

공정하게 심사하여 입주민들이 납득할 수 있는 적정한

분양 가격을 결정하기 위함

□ 주택법 개정(‘07. 4. 23 공포)

○ 주택법 제38조의 2 (주택의 분양가격 제한 등)

- 공공택지 외 택지에서 건설, 공급하는 주택으로 확대(공공․민간택지)

○ 주택법 제38조의 4 (분양가 심사위원회의 운영 등)

- 분양가격의 적정성 등을 심의하기 위해 분양가 심사위원회 설치 운영

○ 적용시기 : 2007.  9.  1

□ 추진상황

○ 분양가 상한 자문위원회 구성               : 2007. 1. 30

○ 분양가 상한 자문 위원회 자문실시

- 중화산동 오페라하우스 외 3건 권고자문 : 200～922천원(3.3㎡당) 하향조정

○ 분양가 심사위원회 구성                    : 2007. 9.  8

- 중화산동 광진햇빛찬 2차 외 3건 권고자문 : 429～759천원 (3.3㎡당) 하향조정

○ 분양가 심사위원회 심사                    : 2008. 5. 20

- 인후동 송정, 중화산동 옥성 분양가 심사 : 270천원～420천원 (3.3㎡당) 하향조정

○ 분양가 심사위원회 심사                    : 2008. 9.  4

- 우아동 (주)선변주택 분양가 심사

□ 금후계획

○ 주택법령 규정에 적합하게 심사 분양가 상한 적용하고, 분양가

심사 위원회 결정 금액 이하로 입주자 모집공고 승인

공동주택 품질검수단 구성․운영

○ 아파트 견본주택과 실제 분양아파트 품질 차이로 입주자와

시공자의 분쟁이 빈번한 바

○ 사용검사 전 견본주택과 시공중인 아파트의 품질차이 여부를

민간 전문가의 검수를 통해 품질향상 및 견실시공 유도

□ 공사감리 실태

○ 주택감리(주택법 제24조)

- 설계도서 및 건축자재 관계법령에 적합 여부

- 견본주택 마감자재 동일여부 확인 등

○ 입주자 사전점검제 운영(국토해양부지침 77호 : ‘01. 1 .3)

- 가구, 유리, 타일, 도장, 도배, 주방용구, 위생기구 등 11개 공정

□ 품질검수단 구성․운영(안)

○ 점검대상 : 시공중인 공동주택 단지(8단지 2,330세대)

○ 구    성 : 민간전문가 10인(기술사협회, 건축사협회, 주택공사 등)

○ 점검시기 : 단지별 2회(골조공사시, 입주자 사전점검 1～2개월전)

○ 주요점검내용

- 시공중인 공동주택 감리수행 및 시공 품질사항

- 마감자재 설치 확인 및 품질관리 실태 등

○ 점검결과 조치

- 지적사항에 대하여 설계도서에 적합하게 보수 및 시정

- 부실시공 및 관련법 위반사항시 시공자 및 감리자 행정조치

□ 추진상황

○ 품질검수단 민간 전문가 위촉                : 2008.  7

○ 품질검수단 위원 위촉장 수여 및 간담회 개최 : 2008. 11. 6

□ 금후계획

○ 공동주택 품질검수단 운영                 : 2008. 11

폐 ․ 공가 정비사업

구도심과 변방 지역에서 도시미관을 저해시키고 청소년의

탈선 및 노숙자들의 기거장소로 이용되고 있는 폐․공가를

정비하여 안전하고 쾌적한 Art-Polis 조성에 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 구도심 및 변방에 방치된 폐․공가

○ 사업기간 : 2008 ～ 2012 (5개년)

○ 규    모 : 폐․공가 776동(완산 460, 덕진 316)

○ 사업내용 : 철거 가능한 건축물 소유자 동의 하에 시 전액

부담으로 철거

○ 사 업 비 : 총사업비 3,880백만원(시비 : ‘08 예산액 200백만원)

□ 추진상황

○ 폐․공가 소유자 소재 파악               : 2008.  4～8

- 폐․공가 정비대상 20개동 (완산 12, 덕진 8)

○ 동의가 완료된 폐․공가 12개동 우선 발주 : 2008.  9～10

- 6개동 철거 완료

○ 8개동 설계 완료                         : 2008. 10

□ 문제점 및 대책

○ 장기간 방치되어 인근 주민들조차 소유자의 소재 파악이 불가능

하여 동의서 받는데 상당시간 소요

⇨ 각동 주민센터 통반장을 활용하여 1차 파악하고 주민등록부서

(또는 세무전산부서)협조를 받아 연락처 등 소재 파악

□ 금후계획

○ 철거 및 정비완료                        : 2008.  9～12

공사 중 방치 건축물 울타리 설치

건축허가 후 공사 중 사업주 부도 등으로 인해 방치되고 있는

건축공사장에 대한 울타리를 설치하여 Art-Polis에 맞는

도시 미관 개선 및 안전 도모

□ 사업개요

○ 위     치 :  완산구 서노송동 비사벌문화센터 현장 외 1개소

○ 사업기간 : 2008

○ 사 업 비 : 50백만원(시비)

○ 사업내용 : 공사 중 방치 건축물 울타리 2개소 설치

- 당초 5개소 → 변경 2개소(사유 : 공사재개 및 건축물 철거)

- 가설울타리 벽면 디자인(비사벌문화센터 현장)

○ 사업규모

- 서노송동 비사벌문화센터 현장 : L=72m  H=4m (가설방음판)

- 평화동 다세대주택 현장 : L=30m  H=2.4m (전기아연도금강판)

□ 추진상황

○ 아트폴리스 추진위원회 자문               : 2008. 4. 24

○ 가설울타리 디자인 설계 용역 의뢰         : 2008. 5. 15

○ 아트폴리스 추진위원회 재 자문            : 2008. 6.  5

○ 가설울타리 디자인 설계 완료              : 2008. 6. 19

○ 공사 발주                                : 2008. 8

○ 공사 완료                                : 2008. 9

□ 금후계획

○ 공사 중 방치건축물이 발생할 경우 안전사고 예방을 위하여 예산

확보 후 울타리 설치

⇨ 안전관리예치금 대상이 아닌 공사장에 한함

서신복합문화센터 건립

대규모 서부 신흥지역 주거단지 내 문화 시설이 부족하여 주민들의

문화 욕구를 충족하고 다목적 기능을 갖춘 복합 문화시설을 건립

삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 서신동 804번지외 1필지 (주민센터 옆)

○ 부지면적 : 2,016.7㎡

○ 규    모 : 지하1/지상 5층, 연면적 6,105㎡

○ 용    도 : 동주민센터(1층), 자치센터(2층), 도서관(3～5층)

○ 공    정 : 100%

○ 사업기간 : 2006. 12. 20 ～ 2008. 10. 17

○ 사 업 비 : 80억원(국 10, 특교 5, 도 9.9 시 45.1, 청사정비기금 10)

□ 추진상황

○ 투․융자심사                              : 2003. 11. 17

○ 설계 완료                                : 2006.  9.  1

○ 설계 심사 및 주민설명회                  : 2006. 10. 25

○ 공사 착공                                : 2006. 12. 20

○ 공사 준공                                : 2008. 10. 27

○ 시설물 관리 이관(도서관, 동주민센터)      : 2008. 10. 28

농촌마을환경개선(숙원)사업

도시와 상대적으로 소외받고 있는 농촌마을의 열악한 환경을

개선하여 살기 좋은 농촌을 건설하고 도․농간 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 마 을 수 : 206개 농촌자연마을(완산 80, 덕진 126)

○ 사업대상 : 624건(도로, 하수도정비, 주민편익 시설 등)

○ 사업기간 : 2005 ～ 2012 (8개년)

○ 추진방법 : 용역결과에 의거 순차적 사업시행

○ 총사업비 : 377억원(시비)

- 기투자액 : 70억원,  ‘08 예산액 : 20억원

□ 추진상황

○ 2005년 사업 : 33건 완공  30억원(완산 13,  덕진 17)

○ 2006년 사업 : 38건 완공  20억원(완산  8,  덕진 12)

○ 2007년 사업 : 29건 완공  20억원(완산  8,  덕진 12)

○ 2008년 사업 : 28건(10개동) 추진중  20억원(완산  8,  덕진 12)

- 14개 마을  9건 : 공사 완료

- 52개 마을 19건 : 공사 추진중

□ 문제점 및 대책

○ 시 재정여건에 비해 총사업비 과다 소요

⇨ 농촌마을 사업대상 지역중에서 별도 상수도 공급사업, 하수도

정비가 추진되는 사업 및 기존시설 상태가 양호하고 사업효과가

적은사업 제외로 계획예산 축소 추진

□ 금후계획

○ 2008년 사업 마무리 및 준공  : 2008. 12

주택재개발 ․ 재건축사업 추진

주거환경이 불량하고 노후된 건축물을 개량․정비함으로서

도시환경을 개선하고 시민의 주거생활의 질을 높이고자 함

□ 사업개요

○ 정비예정구역 : 44개 구역

(재개발 25, 재건축 10, 사업유형유보 8, 도시환경정비 1)

□ 추진상황

○ 추진위원회 승인 : 26개소(재개발 18, 재건축 8)     : 2006. 7～현재

○ 정비구역 지정 : 3개소(재개발 2, 재건축 1)      : 2006. 7～현재

○ 조합설립 인가 : 4개소(재개발 2, 재건축 2)        : 2006. 7～현재

○ 사업시행 인가 : 1개소(재건축-삼천주공 2)         : 2006. 7～현재

○ 주민설명회, 추진위, 조합, 주민교육 및 지속 홍보     : 2006. 8～현재

○ 변호사선임 및 임대주택 비율 이상 건립 요청          : 2007. 2～ 3

○ 정비구역 지정, 사업시행인가 신청 진행              : 2007. 6～현재

- 정비구역 지정 : 7개소

⇨ 바구멀 1, 동양아파트인근, 다가, 종광대 2, 기자촌, 우아주공 2, 삼천쌍용

- 사업시행인가 : 1개소 (물왕멀)

□ 문제점 및 대책

○ 관련규정 및 절차 미이행으로 주민피해가 예상되므로 적극적인 감독요구

⇨ 민원사항에 대하여 면밀히 검토하여 관련규정 위반시 위원장 고발

○ 일부 주민은 소유 토지에 대하여 제척을 요구하나 추진위원회에서

주민의견을 무시하고 정비계획 및 구역에 포함

⇨ 정비구역지정 신청시 주민의견을 수렴하여 제출토록 행정지도

□ 금후계획

○ 정비구역 신청시 주민의견 반영여부 등을 면밀히 검토하여 행정절차 이행

○ 조합인가신청시 지방업체 참여 및 고문변호사 선임토록 행정지도

※ 조합설립 ⇨ 사업시행인가 ⇨ 관리처분계획인가 ⇨ 사업착공

2단계 주거환경개선사업

○ 도시저소득 주민의 주거환경개선으로 삶의 질 향상을 도모

○ 지역주민과 함께하는 지속가능한 주거환경개선사업 추진

□ 사업개요

○ 대    상 : 18개구역  133ha

- 정비구역확정(14), 부결(2), 유보(1), 공동주택개량방식(1)

○ 사업내용 : 도로개설, 주차장, 공원, 상하수도 정비 등

○ 사업기간 : 2006 ～ 2012 (7개년)

○ 총사업비 : 880억원(국비 440억, 시비 440억)

- 기투자액 : 129억원,   ‘08 예산액 : 41억원

□ 사업방향

○ 사업추진을 위한 거버넌스(추진협의체) 추진체계 구축

○ 거점개발 및 순환형 임대주택, 주민공동이용시설 건설, 단계적 주택 정비

□ 추진상황

○ 도시 및 주거환경정비 기본계획 고시      : 2006.  7. 14

○ 거점시범사업 구역 선정(국비15억 추가확보) : 2006. 10. 30

○ 기본계획 변경 승인 고시                 : 2008.  2. 18

○ 정비구역에 대한 결정 및 고시            : 2008.  6. 20

○ 거점시범사업 정비계획 및 마스터플랜 수립 용역 입찰 공고 : 2008. 10. 21

□ 문제점 및 대책

○ 부결된 신복, 팔복구역이 토지이용 목적상 도시기본계획에 부합되지 않음

⇨ 주거환경개선사업의 주요사항이 기반시설(도로,공원,주차장)

설치이므로 도시계획 재정비시 기반시설 반영 추진 계획

□ 금후계획

○ 구역별 보상 및 우선순위에 따른 사업 추진      : 2008. 11

○ 거점시범사업 정비 및 건축 계획가 선정 / 디자인팀 구성 : 2008. 12

도로안전과 소관

ꊱ	한옥마을 테마 관광로(은행로) 조성	----	48
ꊲ	전주 진입로 확장	----	49
ꊳ	동부우회도로 가속차선 확보(왜막실)	----	50
ꊴ	남도주유소～고속터미널간 도로확장	----	51
	원대한방병원～가련교간 도로개설	----	52
ꊶ	전통문화가 어우러진 남천교 가설	----	53
ꊷ	전주영상제작단지 진입로 개설공사	----	54
ꊸ	남부순환도로 개설	----	55
ꊹ	풍남문～팔달로 중로개설	----	56
	견훤로 개설공사	----	57
	호남제일문～동산고가교 확장	----	58
	태평로 확장	----	59
	쑥고개길(안행교～효자광장)도로확장	----	60
	우전로(서곡광장～서부신시가지) 확장	----	61
	세네길(우림교～포스코)개설	----	62
	대1-3호선 미산초교앞 지장물 철거	----	63
	서남권 국도대체 우회도로 건설	----	64
	북부권 국도대체 우회도로 건설	----	65
	전주～논산간 고속도로 확장	----	66
	전주～광양간 고속도로 건설	----	67
	중앙분리대 시설	----	68
	도로 안내표지판 정비사업	----	69
	아름다운 교량 및 터널 만들기 사업	----	70
	외곽지역 및 교통사고 다발지역 가로등 신설	----	71
	지하차도 및 터널 조도개선사업	----	72
	주요도로 가로등 조도개선	----	73
	가로등 양방향 시스템 설치	----	74

한옥마을 테마관광로(은행로) 조성

○ 한옥마을을 찾는 국내외 관광객들의 안전한 보행권 확보

○ 가장 한국적인 전통문화 이미지를 반영 관광명소로 부각

□ 사업개요

○ 구    간 : 교동 남천교∼동부시장

○ 사 업 량 : 연장 980m,  폭 8 ⇨ 12m

○ 사업기간 : 2005 ～ 2008 (4개년)

○ 사 업 비 : 13,060백만원

□ 추진상황(전체공정 100%)

○ 공사착수                                 : 2006.  4. 22

○ 실개천 통수 및 은행로 경관조명 점등행사  : 2008.  4. 29

○ 통수 및 점등식 이후 발생된 문제점 보완   : 2008.  5～6

- 물고임 구간, 초화류 훼손부분, 경관조명 등

○ 완산경찰서 일방통행 방향결정(충경로⇨남천교) : 2008. 6. 5

○ 야간 경관조명 전문가, 지역주민 간담회     : 2008. 6. 12

○ 교통 안전시설물 설치(완산경찰서 협의)       : 2008. 6. 30

○ 시설물 인계 인수                           : 2008. 9.  5

○ 준   공                                  : 2008. 9. 10

전주 진입로 확장

○ 우리시 관문인 전주진입로 정비로 쾌적한 도시환경 제공

○ 도로 미 확장구간 확장으로 병목해소 및 교통편익증진 도모

□ 사업개요

○ 구    간 : 덕진동 원대한방병원～팔복동 BYC

○ 사 업 량 : 연장 1,320m,  폭 35 ⇨ 50m

○ 사업기간 : 1999 ～ 2008 (10개년)

○ 사 업 비 : 17,000백만원(보상 10,000. 공사 7,000)

- 기투자액 : 14,486백만원,   ‘08 예산액 : 2,300백만원

□ 추진상황(전체공정 95%)

○ 원대한방병원～추천대교간 확장완료(710m)    : 1999～2003

○ 추천대교～BYC측 확장완료(610m)          : 2004～2006

○ 추천대교～전북은행간 착공(9차공사)         : 2008.  4

- 인도 및 차도 포장 완료

- 조경수목 식재 완료

□ 금후계획

○ 교통안전 시설물 설치, 주변정리 및 마무리      : 2008. 11

○ 준  공                                    : 2008. 11월말

동부우회도로 가속차선 확보(왜막실)

○ 우아동지역에서 동부우회도로 진입시 교통사고 다발지역

으로 완산경찰서장으로부터 개선요구 지역으로써

○ 가속차로 설치로 교통사고를 예방하여 시민의 생명과 재산을

보호하고자 함

□ 사업개요

○ 구    간 : 덕진구 우아동 관암교 부근～쓰레기매립장

○ 사 업 량 : 가속차로 설치 1개소

연장 150m,  폭 3.0m

○ 사업기간 : 2008년

○ 사 업 비 : 300백만원

□ 추진상황(전체공정 95%)

○ 실시설계 완료                           : 2008.  4

○ 공사 착공                               : 2008.  5

- 아스콘 포장 완료

□ 금후계획

○ 교통안전시설 및 가로등 설치 작업        : 2008. 11

○ 준  공                                  : 2008. 11월말

남도주유소~고속터미널간 도로확장

○ 도로확장 및 보도설치로 보행자와 고속터미널 이용자들의

편익증진 도모

○ 노후건물 재건축등으로 도시미관 제고 및 침체지역 활성화

□ 사업개요

○ 구    간 : 금암동 남도주유소～고속터미널간

○ 사 업 량 : 연장 500m,  폭 20 ⇨ 23m

○ 사업기간 : 2004 ～ 2009 (6개년)

○ 사 업 비 : 3,700백만원 (보상1,700. 공사1,600, 한전지중화400)

□ 추진상황(전체공정 50%)

○ 도시계획 도로폭 축소(25m⇨23m)결정  : 2005.  6

○ 보상추진(터미널～남도주유소/200백만원)  : 2005. 12～2006.  1

○ 실시설계 용역 완료                 : 2006. 2

○ 용지보상 완료                          : 2007. 7. 10～2008. 10

○ 공사착공                            : 2008. 5

- 용지보상과 지장물 철거 및 지하 매설물 설치 완료

□ 금후계획

○ 인도판석 포장                       : 2008. 11

○ 중앙분리대 설치 및 조경 수목 식재   : 2008. 12

○ 완  공                              : 2009.  2

원대한방병원～가련교간 도로개설

○ 하가택지개발사업 시행으로 간선도로망 확충 절대 필요

○ 송천동과 서부지역을 연결하는 도로개설로 도심교통난 해소

□ 사업개요

○ 구    간 : 덕진동 도립국악원～덕진동 가련교간

○ 사 업 량 : 연장 1,400m,  폭 35m

○ 사업기간 : 2005 ～ 2009 (5개년)

○ 사 업 비 : 30,000백만원 (보상 13,000, 공사 17,000)

- 기투자액 : 14,560백만원,   ‘08 예산액 : 7,000백만원

□ 추진상황(전체공정 65%)

○ 1～2차공사 시행 (가련교～한방병원 뒤)     : 2006.  5～2008. 5

○ 편입토지 및 지장물보상 완료           : 2008.  6

○ 도립국악원～한방병원간 도로확장 완료    : 2008. 10

○ 3차공사 추진(한방병원구간 암절취)     : 2008.  6～2009. 5

□ 문제점 및 대책

○ 암 발파에 따른 소음․진동으로 인한 인근 피해발생 우려

⇨ 병원 및 지역주민과 사전 협의 안전시설(방호․방음벽) 설치 후 공사시행

□ 금후계획

○ 도립국악원～한방병원 도로확장구간 조경 수목 식재 : 2008. 11

○ 대절토부 암절취 및 구조물시공         : 2008.  1～2009. 2

○ 종점부(하가지구 인접부) 우․오수관 완공       : 2008. 11～2009. 4

○ 준  공                                    : 2009. 10

전통문화가 어우러진 남천교 가설

○ 한옥마을ㆍ한벽루등 자연형 하천과 어우러진 교량 가설로

가장 한국적인 전통문화도시의 이미지 부각

○ 통과ㆍ연결기능에서 휴식공간을 확보 천년전주 상징화

□ 사업개요

○ 구    간 : 은행로∼전주천좌안도로

○ 사 업 량 : 교량가설  (L=82.5m,  B=16m)

하천공작물 (L=82.5m,  B= 9m)

○ 사업기간 : 2006 ～ 2009 (4개년)

○ 사 업 비 : 12,000백만원

- 기투자액 : 2,200백만원,   ‘08 예산액 : 5,000백만원

□ 추진상황(전체공정 20%)

○ 기본 및 실시설계 용역                     : 2007. 4～11

○ 남천교 가설공사 착수                      : 2008. 1. 29∼

- 하천부 가도 및 진입용 가도 설치  - 오탁방지망 및 세륜시설 설치

- 보도교(L=80m, B=3m) 설치    - 상수관 이설 (D600㎜)

○ 공사기간중 교통처리계획 협의 완료         : 2008. 4.  2

○ 기존교량 철거                             : 2008. 9. 20

○ 1차 공사 완료(교량철거, 지하매설물 이설 등)   : 2008. 9. 25

○ 2차 공사 발주(누각설치, 접속도로, 조경 등)     : 2008. 10. 29

□ 금후계획

○ 가리내길 편입용지 미협의자 토지수용(4건)    : 2008. 11.

○ 마무리 사업발주 (누각설치, 접속도로, 조경 등) : 2009.  3

○ 완  공                                    : 2009. 12.

전주영상제작단지 진입로 개설공사

○ 상림동에 조성중인 실내ㆍ외 촬영장 진입로가 없어 도로개설 절실

○ 진입로개설로 촬영장 접근용이 및 원상림마을 주민들의 오랜 숙원해소

□ 사업개요

○ 구    간 : 상림동 서진로 ～ 원상림마을 앞(대로1-16호선)

○ 사 업 량 : 연장 1,880m,  폭 12～15m

○ 사업기간 : 2008 ～ 2011 (4개년)

○ 사 업 비 : 16,000백만원 (보상 6,000, 공사 10,000)

- 2008 예산액 : 5,000백만원

□ 추진상황

○ 지방재정 투융자 심사                     : 2006. 10

○ 실시설계 용역 완료                       : 2008.  2～6

※ 박물관～쓰레기소각장 개설 (L=1.95km, B=16m, 168억원) : 2003～2006

○ 도시계획사업 실시계획 인가               : 2008.  8. 20

○ 감정완료 및 보상통보                     : 2008.  9. 26

※ 총 64필지 44,722㎡ 중 24필지 14,800㎡ 보상완료(37.5%)

□ 금후계획

○ 영상제작단지 대로1-16호선 용지보상       : 2008. 12

○ 영상제작단지 중로 시설결정               : 2008. 12

○ 영상제작단지 중로 용지보상               : 2009.  6

○ 도로개설 사업 시행                       : 2009～2011

※ 2009년도 : 진입로 용지보상 및 총괄 발주 후 확보예산 범위내 공사추진

남부순환도로 개설

○ 서남권 지역의 교통량을 외곽으로 분산시켜 도심교통난 해소

○ 외곽 도로망 구축으로 주변의 발전 기틀 마련 및 교통편익 제공

□ 사업개요

○ 구    간 : 서서학동 공수교～동서학동 좁은목

○ 사 업 량 : 연장 1,560m,  폭 25～35m

○ 사업기간 : 1998 ～ 2010 (13개년)

○ 사 업 비 : 36,800백만원(보상 21,600, 공사 15,200)

- 기투자액 : 24,057백만원,   ‘08 예산액 : 8,500백만원

□ 추진상황(전체공정 65%)

○ 공수교～거산황궁ⓐ～무궁화주유소간 개통(18,500백만원)   : 1998～2006. 5

○ 전일연립～산성천간 토지 및 지장물보상(3,000백만원)  : 2007. 2～12

○ 5차공사(전일연립～산성천)시행(2,500백만원)   : 2007. 7～12

○ 6차공사(전일연립～산성천) 피암터널 시공         : 2008. 6～2009. 6

□ 문제점 및 대책

○ 산성천 횡단교량 계획고를 현 지반고에 맞추어 시공 요구

(지역주민 259명) 산성천 교량 계획고 현 지반보다 1.5m 높게

계획됨(하천기본계획 반영)

⇨ 주거환경개선지구 소로개설 사업과 연계, 부체도로 및 연결

도로개설 추진예정

□ 금후계획

○ 전일연립주택～산성천간 공사추진            : 2008.  1～12

○ 흑석골 입구 교통광장 편입토지 미협의자 토지 수용  : 2008. 11～12

○ 산성천～좁은목 토지보상 추진               : 2008. 11～ 2009. 5

○ 잔여구간 공사추진 및 준공                 : 2010. 10

풍남문~팔달로 중로개설

○ 팔달로와 기린로(한벽당)를 연결하는 도로망 확충

○ 풍남문앞을 가리는 대형 건축물 철거로 문화재 경관향상

○ 경기전, 남부시장 등 이용시민의 주차장 확보 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 풍남문∼팔달로(전동성당 앞)

○ 사업규모 : 총 면적 2,500㎡(도로 200㎡, 주차장 2,300㎡)

- 도로확장 L= 50m,   B= 15m ⇨ 20m(중로 2-3)

- 주 차 장 A= 2,300㎡(지상 90면)

○ 사업기간 : 2008 ∼ 2009 (2개년)

○ 총사업비 : 8,200백만원(보상 7,200, 공사 1,000)

- 2008 예산액 : 8,200백만원 (특별교부세 1,200, 시비 7,000)

□ 추진상황(전체공정 20%)

○ 지방재정 투융자 심사(적정)                  : 2008.  6.  4

○ 편입용지 및 지장물 조사(영업권 등)          : 2008.  7. 23

○ 도시계획시설결정(주차장)용역                : 2008.  8. 13

○ 도시계획시설 결정(주차장) 주민 공람(도시과)      : 2008. 10. 20

○ 도시계획위원회 심의 요청(도시과)              : 2008. 10. 21～

○ 도시계획위원회 결정                          : 2008. 11. 11

□ 금후계획

○ 편입토지 및 지장물, 영업권 등 감정평가 및 사정     : 2008. 11. 30

○ 실시설계 용역                               : 2009.  2

○ 도로확장, 주차장 조성공사 추진              : 2009.  3～6

견훤로 개설공사

○ 동남부지역 통과를 위한 남노삼거리 부근의 극심한 교통

체증해소 및 기린로 접합부의 원활한 교통처리

○ 도시가로망 확충으로 구도심 활성화 및 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 기린봉@ ∼ 기린로

○ 사업규모 : 연장 730m,  폭 20m

○ 사업기간 : 1999 ∼ 2009 (11개년)

○ 총사업비 : 27,000백만원(보상 16,200,  공사 10,800)

- 기투자액 : 14,310백만원,   ‘08 예산액 : 30백만원

□ 추진상황(전체공정 53%)

○ 마당재～기린봉@ (560m. 11,900백만원)개통     : 1999.  3～2001. 12

○ 공사중지(예산 미확보)                      : 2002.  5. 27

○ 기린봉@～농원마을 보상․철거(220m/2,410백만원)       : 2003～2005

○ 선형변경 검토방안 시의회 간담회, 주민설명회  : 2006. 11. 23

- 결정노선“안” : 견훤로의 기 보상구간 활용 리베라호텔까지 연결

(견훤로∼원산파크@∼천주교전주교구 남측∼기린로(리베라호텔)

○ 도시 및 주거환경정비 기본계획 변경․주거환경 정비계획(추심정,

간납대지구 포함) 시 도시계획위원회 자문(도심진흥과)    : ‘07. 8. 30

○ 도시 및 주거환경정비기본계획 변경승인 신청(시 ⇨ 전라북도) : ‘07. 9. 12

○ 전라북도 도시․건축 공동위원회 심의(추심정, 간납대지구)   : ‘08. 5. 13

○ 주거환경개선사업 정비구역 결정고시              : ‘08. 6. 20

□ 금후계획

○ 보상완료 구간 공사(L=140m)추진                : ’09. 3∼12

호남제일문∼동산고가교 확장

○ 시내 관통 일부구간 미확장으로 인한 교통체증 해소

○ 하수도 및 보도미설치로 인한 주민불편 해소 및 교통안전 도모

□ 사업개요

○ 위    치 : 호남제일문사거리～동산고가교

○ 규    모 : 연장 1,000m,  폭 18.5 ⇨ 35m

○ 사업기간 : 2008 ～ 2010 (3개년)

○ 총사업비 : 15,000백만원 (보상 10,000  공사 5,000)

- 2008 예산액 : 100백만원

□ 추진상황

○ 호남제일문～동산고가교 반폭 개통          : 1982년

(L=1,000m, B=18.5m 국가사업)

○ 실시설계용역 발주(100백만원)              : 2008. 2

□ 문제점 및 대책

○ 시내를 관통하는 국도1, 26호선의 병목현상으로 인한 교통사고

빈번한 발생

○ 장기 미집행 도시계획시설 재산권행사 제한 및 하수도, 보도

미설치로 인한 인근 주민의 불편 및 소외감이 심함

⇨ 연차적으로 예산확보 후 보상 및 공사 추진

□ 금후계획

○ 실시설계 용역 완료                       : 2008. 11

○ 도시계획사업 실시계획 인가               : 2008. 11

○ 보상 및 도로확장 공사                    : 2009～2010

태 평 로  확 장

○ 도심을 통과하는 간선도로 개설로 교통체증 해소

○ 도시가로망 확충으로 구도심 활성화 및 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 태평동

○ 사 업 량 : 연장 900m,  폭 13 ⇨ 25m

○ 사업기간 : 2004 ～ 2011 (8개년)

○ 사 업 비 : 7,800백만원 (보상 4,500, 공사 3,300)

- 기투자액 : 1,243백만원,   ‘08 예산액 : 2,200백만원

□ 추진상황(전체공정 25%)

○ 실시설계용역 완료                           : 2004. 6

○ 대동길～농협 구간 편입용지 보상완료(400백만원)  : 2008. 8

○ 농협～임페리얼 구간 보상 추진중(1,800백만원)

- 토지 24 필지중 6필지 보상완료

○ 농협～동양@ 구간 협약체결(시 - 용지매수, KT&G - 공사)    : 2008. 8. 12

- L=280m, B=11⇨18m(예산절감 700백만원 정도)

○ 공사착공(SK-뷰@ 구간, L=120m)              : 2008. 10

※ SK-뷰 맞은편 구간은 태평l지구 재개발시 확장 예정

□ 금후계획

○ 지방토지수용위원회 재결 신청(10필지 720㎡)       : 2008. 11

○ 농협～동양아파트 사거리 보상 및 공사시행       : 2008. 9～2009. 4

○ 대동길～농협, 동양@ 사거리～임페리얼 구간      : 2009～2011

쑥고개길 (안행교~효자광장) 도로확장

○ 주공 4, 5단지 택지개발 및 대규모 주상복합 신축에 따라

장차 교통량 증가로 극심한 교통체증 예상

○ 도시가로망 확충으로 구도심 활성화 및 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 구    간 : 효자동 안행교사거리～효자광장

○ 사 업 량 : 연장 570m,  폭 25 ⇨ 35m

○ 사업기간 : 2007 ～ 2011 (5개년)

○ 사 업 비 : 10,000백만원(보상 7,000, 공사 3,000)

- 기투자액 : 200백만원,   ‘08 예산액 : 1,000백만원

□ 추진상황

○ 실시설계 용역 완료                        : 2007. 9～2008. 2

○ 안행교 사거리 구간 편입용지 보상(1,000백만원)  : 2008. 8～

- 토지 5필지 681㎡중 2필지 234㎡ 협의 완료(40%)

□ 금후계획

○ 안행교 사거리 부근 미보상 토지수용 신청  : 2008. 11

○ 잔여구간 보상 및 공사추진               : 2009～2011

우전로(서곡광장~서부신시가지) 확장

○ 전주공단～서부신시가지간 연결 기능 강화

○ 서부신시가지～전주공단간 연결도로 교통 병목현상 해소

(35m → 20m → 35m)

□ 사업개요

○ 구    간 : 효자동 서곡광장～서부신시가지 경계

○ 사 업 량 : 연장 1,200m,  폭 20 ⇨ 35m

○ 사업기간 : 2007 ～ 2011 (4개년)

○ 사 업 비 : 8,000백만원(보상 3,000, 공사 5,000)

- 기투자액 : 300백만원,   ‘08 예산액 : 2,000백만원

□ 추진상황

○ 서곡지구 택지개발시 부분개설(폭 20m)       : 1997년

○ 실시설계 및 서곡광장 가각정리공사(L=200m, B=35m) 완료  : 2008. 8

○ 편입용지 보상(2,000백만원)                  : 2008. 10～11

- 토지 11필지중 10필지 보상 완료(90%)

□ 금후계획

○ 잔여구간 보상 및 도로확장 공사 추진        : 2009～2011

세내길(우림교~포스코)개설

○ 대단위 신축아파트 밀집지역의 진출입로 미개설로 교통체증 심각

- 아파트 1,918세대가 2005. 9～2007. 5 입주 완료

○ 서부신시가지와 연계되는 주요 노선으로 도로개설이 시급함

□ 사업개요

○ 구    간 : 효자동 우림교～포스코 APT 앞

○ 사 업 량 : 연장 356m,  폭 25m

○ 사업기간 : 2006 ～ 2008 (3개년)

○ 사 업 비 : 5,350백만원(보상 2,200, 공사 3,150)

□ 추진상황(전체공정 75%)

○ 보상협의 완료(19필지)                   : 2006. 3～2008. 5

○ 1차공사(교량가설) 완료                  : 2007. 9～2008. 5

○ 2차공사(도로개설 L=350M) 추진         : 2008. 6～12

□ 문제점 및 대책

○ 도로선형 변경 및 보상가 저렴을 이유로 보상협의 지연(1필지 167㎡)

⇨ 지속적인 협의 설득과 불응시 수용재결 추진

□ 금후계획

○ 미협의 보상 토지 보상 및 토지수용 추진 (1필지)     : 2008. 11

○ 공사 마무리 추진 및 준공                   : 2008. 12

대1-3호선 미산초교앞 지장물 철거

미산초등학교 주변 교차로에 건물로 인해 교통시야를 가려

등하교길 어린이 및 통행차량의 교통사고 위험을 해소하고자

건물철거후 통학로 확보 (지금까지 교통사고 28건 발생)

□ 사업개요

○ 구    간 : 미산초교앞 교차로

○ 사 업 량 : 건물1동 철거, 통학로 정비 120m

○ 사업내용 : 미산초교 앞 교통시야를 방해하는 지장물 철거 및

미산초교 통학로 조성

○ 사업기간 : 2008년

○ 사 업 비 : 120백만원

□ 추진상황

○ 건물 보상협의 통보 및 협의 매수         : 2008. 8～10

□ 문제점 및 대책

○ 미산초교 앞 건물로 인해 어린 학생 등 교통사고가 발생 조속히

협의 매수코자 노력했으나 협의 어려움(건물1동-83백만원)

⇨ 토지수용 재결 후 강제집행 추진

□ 금후계획

○ 지장토지수용위원회 재결신청             : 2008. 11

○ 지장물 철거 및 임시 통학로 조성         : 2008. 12

서남권 국도 대체 우회도로 건설

○ 시가지를 통과하는 국도1호, 17호, 27호선과 지방도 712호,

716호, 749호선의 교통량을 분산하여 시내권 교통정체 해소

○ 서남부지역 원활한 물동량 이동의 중심기능을 강화함으로써

지역개발 촉진 및 광역도시 발전기반 구축

〈계속 ․ 국가사업〉

□ 사업개요

○ 구    간 : 완주군 상관∼구이∼이서∼용정∼익산시 춘포

- 완공예정 : 구이∼용정(2008년말), 용정∼춘포(2010년)

○ 사업규모 : 33.4km(폭 20m)  ※ 전주시 구간 13.4㎞

○ 사업기간 : 1998 ∼ 2010 (13개년)

○ 시 행 청 : 익산지방국토관리청 (보상 : 전주시)

○ 사 업 비 : 4,676억원 (국비 4,368, 시비 308) ※ 시비 전액확보

□ 추진상황

○ 상관 ∼구이간(L= 8.9㎞)개통              : 2005. 4. 20

○ 구이 ～ 춘포간(L=24.5㎞) : 보상 및 공사추진

- 공사 및 보상실적 : 4,157억원(국 3,849, 시 308)

- 구간별 공정 : 구이∼이서(98%), 이서∼용정(97%), 용정∼춘포(57%)

○ 보상 완료                                : 2008. 8

□ 금후계획

○ 용지보상 및 공사추진(이서～용정, 용정～춘포) : 314억원(국비)

○ 구이～용정간 완공                        : 2008. 12. 30

북부권 국도 대체 우회도로 건설

〈계속 ․ 국가사업〉

○ 시가지 통과 국도17, 27호선 교통량 분산으로 시내권 교통정체 해소

○ 북동부지역 원활한 물동량 이동의 중심기능을 강화함으로써

지역개발 촉진 및 광역도시 발전기반 구축

□ 사업개요

○ 사업구간 : 조촌 용정∼용진(구간축소)～아중역(1단계)～색장리(2단계)

※ 2단계구간(용진～색장) 전주～광양고속도로 교통수요 예측 후 개설

○ 사업기간 : 2006 ∼ 2013 (8개년)

○ 사업규모 : L=11.2km, B=20m(전주시 구간 : 8.4㎞)

○ 시 행 청 : 익산지방국토관리청 (보상 : 전주시)

○ 사 업 비 : 2,140억원 (국비 1,970, 시비 170)

- 기투자액 : 138억원(국비135, 시비3),   ‘08 예산액 : 185억원(국비150, 시비35)

□ 추진상황(전체공정 13%)

○ 업체선정                  : 2006. 5. 30

○ 공사 및 보상실적          : 293억원(국비285, 시 8)

○ 편입용지 분할측량 완료    : 977필지 634,707㎡

○ 1단계(용정～아중역)에서 축소된 구간(용진～아중역)연장 건의

- 공문발송(2007. 4. 30), 국토해양부 등 방문건의(4회)

□ 문제점

○ 2009년 공사비 400억원(국비)정도 확보될 예정이나 지방비(보상비용)

확보가 어려워 사업추진 난망

- 지방비 부담액 지방채발행 검토

전주∼논산간 고속도로 확장

〈계속 ․ 국가사업〉

○ 천안∼논산간 고속도로 개통에 따른 교통정체 해소

○ 논산∼전주간, 전주∼광양간, 익산∼장수간 고속도로 연결로

물류비용 절감

○ 행정수도 연계 교통망 구축으로 지역균형발전의 활성화 도모

□ 사업개요

○ 구    간 : 전주 ∼ 삼례 ∼ 논산간

○ 사업기간 : 2002 ∼ 2010 (9개년)

○ 사업규모 : 연장 17.0km,  폭 4차로 ⇨ 6∼8차로

○ 시 행 청 : 국토해양부(한국도로공사)

○ 사 업 비 : 3,500억원(국비)

- 삼례∼논산 구간 사업비 : 2,143억원

□ 추진상황 -- 682억원

○ 공사발주 및 착공                 : 2005. 12. 27

○ 삼례∼논산 구간 공정(45%)

□ 문제점 및 대책

○ 미 발주 구간인 전주∼삼례간은 전라선 복선 전철화(익산～신리)

2011년 개통을 위해서 시급히 확장 필요

- 국토해양부 및 한국도로공사 등 지속건의 : 2008년도 8회 방문

□ 금후계획

○ 편입용지 보상 및 공사 추진중 ⇨ 예산확보 457억원(국비)

○ 완  공                           : 2010. 12

전주∼광양간 고속도로 건설

〈계속 ․ 국가사업〉

○ 군장산업단지와 광양만 산업단지의 연결도로망 구축 시급

○ 호남고속도로 및 익산∼장수간 고속도로의 연결로 고속도로

이용률 제고 및 산업 경쟁력 증진

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주 ∼ 남원 ∼ 광양간

○ 사업규모 : 연장 117.8km(전주시 구간 7.78㎞)

○ 사업기간 : 2003 ∼ 2011 (8개년)

○ 시 행 청 : 국토해양부(한국도로공사)

○ 사 업 비 : 28,231억원(국비)

□ 추진상황 -- 9,389억원

○ 도로구역 결정고시               : 2004.  9

○ 전주∼남원구간(60.7㎞,8공구)공정 : 63%

- 시공업체 : 대림, 두산산업개발

□ 금후계획

○ 편입용지 보상 및 도로 축조공사 : 4,275억원(국비)

○ 완공예정(1년 조기완공)         : 2010. 12

중 앙 분 리 대 시 설

○ 중앙선 침범 및 무단횡단으로 인한 도심교통사고 예방

○ 도로중앙화단 수목식재로 녹색가로환경 조성 및 도심열섬해소 기여

□ 사업개요

○ 구    간 : 교통사고 잦은 주요 간선도로(4차선 이상)

○ 사 업 량 : 29개노선  연장 50.1㎞

○ 사업기간 : 2002 ～ 2011 (10개년)

○ 사 업 비 : 12,416백만원 (국비 6,208, 시비 6,208)

- 기투자액 : 7,128백만원,  ‘08 예산액 : 428백만원

□ 추진상황

○ 중앙분리대 정비계획 수립               : 2003.  6

○ 2007이전 16개노선 L=24.3㎞ (화단형 16㎞, 방호형 4㎞, 수벽 4.3㎞)

○ 2008년 상반기 추진사항 : L=526m (곰솔나무길, 화산로)

□ 금후계획

○ 녹두길 중앙분리대사업(경찰서 건의) 추진

- 구    간 : 녹두길 (금암광장～경기장사거리～원대한방병원앞)

화산로 (운동장네거리 ～ 백제교)

- 사 업 량 : L=913m (화단형 중앙분리대, 차선도색 등)

- 사 업 비 : 300백만원 (추경확보 : 수목식재 제외)

○ 추진상황

- 계약 및 착공                         : 2008. 10.  8

- 공사중지                             : 2008. 10. 30

※ 사유 : 수목식재비 미확보로 분리대만 추진할 경우 민원이

예상되어 2009년 본예산 확보 후 동시 추진

※ 중앙분리대 조경식재 사업

ㆍ곰솔나무, 화산로 : 188백만원 (2008. 11 발주예정)

ㆍ녹두길, 화산로 : 2009년 예산확보 후 추진

도로 안내표지판 정비사업

전주를 찾는 방문객․통행인에게 쉽고 편리한 목적지 안내에

기여 및 아름다운 도시가로망 조성

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 관내

○ 규    모 : 도로안내표지판 정비 100개소

○ 사업내용 : 문자삽입 및 수정, 판교체, 신설등

○ 사업기간 : 2008. 3 ～ 12

○ 사 업 비 : 100백만원

※ 신속한 민원처리를 위해 년중 단가계약으로 시행

□ 추진상황

○ 사업발주                          : 2008.  3. 26

○ 착    공                          : 2008.  4. 15

○ 실    적 : 85개소

- 정비기간 : 2008. 4. 15 ～ 10. 30

- 정비개소 : 85개소

(문자수정 및 삽입 72, 판교체 5, 신설 5, 교체 1, 철거 1, 지주도색 1)

○ 준    공                          : 2008. 11

아름다운 교량 및 터널 만들기 사업

○ 설치가 오래된 교량의 난간을 현대적 감각으로 리모델링하여

전통문화도시 이미지 제고

○ 동․서간 연결터널이 준공 후 10여년이 지나 퇴색되고 어두운

터널을 새롭게 정비하여 안전한 통행유도

□ 사업개요

○ 대상시설물 : 3개소(교량 1, 터널 2)

- 교   량 : 서곡교     - 터   널 : 어은터널, 진북터널

○ 사업내용

- 교   량 : 조형난간 및 야간경관 조명설치 등

- 터   널 : 벽면 리모델링 및 주변 조경 등

○ 사업기간 : 2007 ～ 2009 (3개년)

○ 총사업비 : 2,350백만원(시비)

- 기투자액 : 50백만원,    ‘08 예산액 : 600백만원

□ 추진상황

○ 용역설계 완료                            : 2008.  2

○ 사업비 확보(추경 600백만원)               : 2008.  6

➩ 어은, 진북터널 정비 사업추진

○ 입찰 및 착공                             : 2008.  9. 16

○ 공사 중지                                 : 2008. 10. 13

□ 문제점 및 대책

○ 터널 입ㆍ출구 전면 화강석 석재판 붙임과 내부휀스 교체로

설계되어 예산낭비 우려가 있고 아름다운 터널조성 사업 취지에

적합하지 못한 것으로 지적

⇨ 터널에 대한 다각적인 디자인을 검토하여 아름다운 터널이

되도록 변경시행

□ 금후계획

○ 터널 디자인 검토(아트폴리스 자문등)       : 2008. 11

○ 공사시행 및 완료 예정                    : 2009.  2

외곽지역 및 교통사고 다발지역 가로등 신설

○ 관내 외곽지역 및 교통사고 다발지역에 가로등 신설

○ 교통사고 예방 및 밝은 밤거리 조성으로 주민 불편해소

□ 사업개요

○ 위    치 : 관내 외곽지역 및 교통사고 다발지역

○ 규    모 : 가로등 신설 80등

○ 사업내용 : 가로등(한전주 이용) 신설

※ 신속한 민원처리를 위해 년중 단가계약으로 시행

○ 사업기간 : 2008.  3 ～ 12

○ 사 업 비 : 100백만원

□ 추진상황(51%)

○ 자체 실시설계 및 공사발주(단가계약)       : 2008. 2～3

○ 공사 착공                                 : 2008. 4

○ 관내 가로등 신설추진                      : 2008. 5～11

- 고사동 오거리 3개소 , 효자동 서곡 3개소,  우아동 아중저수지 21개소

□ 금후계획

○ 관내 외곽지역 및 교통사고 다발지역 가로등 신설 추진

⇨ 가로등이 설치되지 않은 민원 발생지역 및 교통사고 다발지역

우선으로 가로등 신설 추진

지하차도 및 터널 조도개선사업

지하차도 및 터널내부 교통사고 예방을 위하여 년중(24시간) 조명

시설의 조도를 밝게 유지 및 개선하여 운전자에게 안전한 차량운행 제공

□ 사업개요

○ 위    치 : 터널 (진북터널, 어은터널)

지하차도 (월드컵, 안덕원, 서신, 송천, 대학로, 남고)

○ 규    모 : L= 2,050m (8개소, 3,068등)

○ 사업내용 : 조도불량램프 교체, 등기구 먼지제거, 누전보수 등

※ 신속한 민원처리를 위해 년중 단가계약으로 시행

○ 사업기간 : 2008. 3 ～ 12

○ 사 업 비 : 100백만원

□ 추진상황(90%)

○ 자체 실시설계 및 공사발주(단가계약)      : 2008. 2～3

○ 공사 착공                                : 2008. 4

○ 어은터널 외 7개소 조도개선 추진          : 2008. 5～11

- 터널등 기구교체 139개소, 조명제어반 교체 1개소, 전기인입선로 교체 1개소

□ 금후계획

○ 민원 발생지역 및 교통사고 잦은 노선 순으로 지속 추진

⇨ 지하차도 및 터널 조명은 년중 24시간 상시 점등되어야 하므로

교통사고 예방을 위하여 주기적으로 조도불량 램프 교체

주요도로 가로등 조도개선

○ 팔달로 등 주요도로 가로등주가 노후로 녹이 슬어 도시

미관상 좋지 않고

○ 도로개설시(30여년전) 설치되어 조도기준(30룩스) 미달 되고

보행등이 설치되지 않아 시가지가 매우 어두운 실정임

□ 사업개요

○ 위    치 : 팔달로 외환은행 ～ 중앙성당

○ 사업내용 : 기존 가로등을 철거하고 신규 설치

○ 규    모 : 가로등 27개소 교체 (L= 920m)

LED 경관조명 80개소 설치

○ 사업기간 : 2008.  6 ～ 10

○ 사 업 비 : 300백만원

□ 추진상황(100%)

○ 가로등 도로굴착 심의 및 허가             : 2008.  3

○ 자체 실시설계 및 공사발주                : 2008.  4～5

○ 공사착공                                 : 2008.  6

○ 가로등 및 LED 경관조명 설치 추진        : 2008.  7～9

○ 공사준공                                 : 2008. 10

○ 공사준공에 따른 인수인계(시 → 구)       : 2008. 11. 5

현지 가로등의 누전 및 점․소등 작동상태를 실시간으로

원격감시 및 제어할 수 있는 가로등 양방향 시스템을 설치

하여 감전사고를 예방하고 신속한 보수체계 확립

가로등 양방향 시스템 설치

□ 사업개요

○ 위    치 : 관내 주요도로 일원

○ 사업내용 : 가로등 분전함 내에 양방향 시스템 설치

○ 사업규모 : 관제시스템 - 1식

가로등 양방향점멸기 : 205개

가로등주 제어기     :  40개

○ 사업기간 : 2008.  4 ～ 12

○ 사 업 비 : 500백만원(특별교부세)

□ 추진상황(86%)

○ 자체 실시설계 및 사업착수(단가계약)      :  2008.  2～3

○ 관제시스템 및 양방향 점멸기 설치(백제로 등 205개소) :  2008.  4～9

○ 가로등 양방향 프로그램 GPS좌표값 입력     :  2008. 10

○ 시가지 이면도로 사업 발주                :  2008. 10

□ 금후계획

○ 관급자재 구입 및 설치 완료               : 2008. 11

○ 관제시스템 및 점멸기 동작시험(준공)     : 2008. 12

차량등록사업소 소관

	청사 환경정비	----	76
	자동차등록 번호판 제작 장비 설치	----	77

청사 환경정비

○ 냉방기 및 등유 온풍기를 천정형 전기 냉․난방기로 교체하여

쾌적한 사무실 조성으로 민원인 편익 증진

○ 차량등록사업소 차량 출구 도로 개설로 차량등록사업소를 이용하는

민원인 편익 증진 도모

□ 사업개요

○ 사업내용

- 천정형 전기 냉․난방기 시설공사

- 출구 도로 개설

- 상수도 급수시설공사

- 청사 증축

○ 사업기간 : 2008.  8 ～ 12

○ 사 업 비 : 230백만원

□ 추진상황

○ 냉․난방시설공사 착공                : 2008. 10.  7

○ 상수도 급수공사 완료                 : 2008.  7. 28

○ 출구 도로공사 착공                   : 2008. 10. 30

○ 냉․난방설치공사 완료                : 2008. 11. 20.

○ 청사증축 착공                        : 2008. 11. 23

□ 금후계획

○ 출구 도로개설 완료                   : 2008. 12. 20.

○ 청사 증축 완료                       : 2008. 12. 20

자동차등록 번호판 제작 장비 설치

○ 자동차등록번호판 직접 제작으로 시민에게 신속한 민원처리

○ 자동차등록번호판 가격을 낮게 교부함으로써 시민들의 경제 부담 경감

□ 사업개요

○ 자동차등록번호판 제작 장비 설치

○ 사업기간 : 2008.  8 ～ 12

○ 사 업 비 : 100백만원

□ 추진상황

○ 전주시 자동차등록 번호판 대행업소에 직접 운영 계획 통보 : 2008. 6. 2

○ 자동차등록번호판 제작 기계 조사 : 2008. 11. 7

- 프레스, 금형

□ 금후계획

○ 자동차등록번호판 장비 구입      : 2008. 12

○ 자동차등록번호판 제작 교부      : 2009. 상반기