아중천 수량 확보 및 생태하천조성공사 개선요구 청원

심    사    보    고    서

1. 심사경과

가. 제출일자 및 제출자  :  2009년  06월  08일    임종훈외 69인

나. 회   부   일   자  :  2009년  06월  08일

다. 상   정   일   자  :  제263회 전주시의회 임시회

제1차 도시건설위원회(2009년 6월 12일)

2. 청원의 개요

청 원 인	소개의원	건 명	접수일
우아동 3가 412번지 진흥하이이츠@ 101 /103 임종훈	서윤근의원	아중천 수량 확보 및 생태하천 조성 공사 개선요구 청원	2009. 6. 8

3. 청취의 취지

◦ 최소한의 생태하천의 기능을 유지할 수 있을 수준의 적정하고도 지속적인 수량 유지에 대한 대책마련

◦ 안전을 위협하고 미관을 저해하는 진입 계단의 전면 교체와 재시공

(목재계단)

◦ 좁은 산책로의 확장 및 산책로 중간 중간의 시멘트 처리부분 수선

◦ 미관저해 차집관거 높이 조절시공의 전수시행

◦ 수생식물 등의 식재를 통한 유해잡초 제거

4. 법적근거

◦ 지방자치법 제73조(청원서의 제출), 제75조(청원의 심사․처리)

◦ 전주시의회 청원심사 규칙 제2조(청원서 제출) 제6조(청원서 회부와 심사)

5. 검토의견

◦ 아중천 생태하천 조성 및 준설사업 사업개요

- 위   치 : 덕진구 우아동 아중리 복개종점 ~ 소양천 합류부

- 사업기간 : 2004 ~ 2009(6개년)

- 사 업 비 : 5,724백만원

- 사업내용 : 호안공 4.8㎞, 산책로 5.4㎞, 교량 2기, 취입보 6개소, 계단 24개소, 운동시설, 수생식물식재 3만주 등

- 추진상황 : 전체공정 70%

호안공 4.0㎞, 산책로 2.8㎞, 교량 2기, 취입보 4개소, 계단 14개소, 운동시설 4종 14개소, 수생식물식재 1.6만주 등

- 잔여공정 : 전체공정 30%

호안공 0.8㎞, 산책로 2.6㎞, 취입보 2개소, 계단 10개소,

수생식물식재 1.4만주 등

◦ 본 사업의 공정 70%가 진행중인 사업으로 진행중에 발생된 민원사항으로 하천의 유지수 확보, 돌계단 설치로 인한 이용에 불편 및 안전사고 위험 내포, 고수부지 협소로 인한 산책로 협소(1.5m, 참고로 전주천 및 삼천 2.0m), 미관저해 시설 제거(차집관 맨홀 등), 수생식물 식재 및 유해 잡초제거 등 집행부에서 적극적인 자세로 검토 보완이 필요하며, 또한 시공이 완료한 부분이라도 수정 변경이 가능한지 법적 검토와 시공비 증가 부분에 대해서는 방안이 강구되어야 한다고 판단되어 우리위원회에서 심도 있는 심사로 의견을 주문하고 청원을 채택하였습니다.

6. 질의답변요지 : 생 략

7. 토 론 요 지 : 없 음

8. 위원회 의견 :

- 아중천 생태복원 사업에 대하여 자체감사 실시와 지금까지 지적된 부분을 전면 재시공 요구

9. 심 사 결 과 : 채  택

의     견     서

ꏅ 의안번호 : 청원 12번

ꏅ 의 안 명 : 아중천 수량 확보 및 생태하천조성공사 개선요구 청원

ꏅ 제출일자 : 2009년  6월 8일

ꏅ 청 원 인 : 전주시 덕진구 우아동3가 412번지 진흥하이츠@ 101/103

임종훈외 69인

ꏅ 청원소개의원 : 서 윤 근

ꏅ 의결일자 : 2009. 6. 12(제263회 임시회 도시건설위원회 제1차 회의)

ꏅ 위원회 의견

◦ 아중천 생태복원 사업에 대하여 자체감사 실시 주문

◦ 현재까지 시공된 부분에서 지적된 사항에 대하여 전면 재시공 요구

청원소개의견서

청원건명	아중천 수량확보 및 생태하천조성공사 개선요구 청원
청 원 인	주 소	전주시 덕진구 우아동 3가 진흥하이츠@ 101/103
	성 명	임 종 훈
소개 의원	서 윤 근 의원
소개년월일	2009년 6월 4일
소개의견 □ 사업개요 ㆍ위치 : 덕진구 우아동 아중리 복개종점~소양천 합류부 ㆍ사업규모 : 생태하천조성 및 하도준설. L=2.88㎞ ㆍ사업내용 : 호안공 4.8㎞, 산책로 5.4㎞, 교량2기, 취입보 6개소, 계단 24개소, 운동시설, 수생식물 식재 ㆍ사업기간 : 2004년~2009년 ㆍ총사업비 : 57억 2천4백만원 본 의원은 아중천변에 위치하고 있는 아파트에 거주하고 있습니다. 매일 아중천을 끼고 출퇴근 하고 있으며 매일처럼 산책로를 이용하 며 아중천을 살피고 있습니다. 아중천 생태하천조성공사가 진행되는 과정에 수많은 주민들의 질문 과 질책, 민원을 받아 왔었고 또한 담당 공무원들을 접촉하였습니 다. 그중 일정하게 수렴되고 보완된 사항들이 존재함에도 현재 아중 천의 모습은 ‘아트폴리스 전주’라는 말을 무색케 하는 수준을 넘어 서고 있다고 판단됩니다. 백문이 불여일견이라 합니다. 청원인의 주장에 대하여 100% 공감하는 본 의원은 ‘아트폴리스 전 주’라는 송하진 집행부의 드높은 기치와 현장의 괴리가 얼마나 큰지 를 직접 눈으로 확인하여 주실 것을 부탁드리는 바입니다.

청    원    서

○ 청원의 취지

아중천 생태하천조성공사가 이제 마무리만을 남기고 있다고 합니다.

아중천은 우정신세계, 진흥, 엘드, 대우2차, 선변, 롯데 등의 아파트가 인접하여 다수의 주민이 밀집되어 있는 시민생활 밀착형 하천입니다.

지난 2006년부터 본격적인 조성공사가 시작되었고 그간 산책로 등의 조성으로 인하여 하루에도 수백명의 주민들이 아중천을 이용하고 있으며 아중천에 대한 주민들의 기대와 애착도 상당히 큰 상황입니다.

하지만 아쉽게도 수십억원이 소요되는 대형 생태하천공사임에도 전반적으로 허술하고 부실한 공사에 주민들의 원망이 큰 상황입니다.

조만간 덕진구청에서 새롭게 조경공사를 시작한다고는 하지만 그것에 우선하여 도저히 묵과하고 넘어갈 수 없는 몇몇 지점에 대하여 즉각적인 수선과 보강이 필요한 실정입니다.

또한 무엇보다도 생태하천의 기본이라고 할 수 있는 안정적인 물의 공급이 이루어지지 않아 심한 악취에 이용객들의 눈살이 찌푸려지고 있습니다. 이에 대한 구체적이고 시급한 대책을 세워주실 것을 청하는 바입니다.

<핵심 청원 사항>

1. 최소한의 생태하천의 기능을 유지할 수 있을 수준의 적정하고도 지속적인 수량 유지에 대한 대책 마련.

2. 안전을 위협하고 미관을 저해하는 진입 계단의 전면 교체와 재시공(목재 계단)

3. 좁은 산책로의 확장 및 산책로 중간중간의 시멘트 처리부분 수선

4. 미관저해 차집관거 높이 조절시공의 전수시행

5. 수생식물 등의 식재를 통한 유해잡초 제거

○ 참고 자료

- 아중천 현장사진 별첨

○ 청원인

성명 : 임   종    훈  (인)

주소 : 전주시 덕진구 우아동3가 진흥하이츠아파트 101동 103호