2009. 6. 12

아중천 수량 확보 및 생태하천 조성공사 개선요구 청원

검    토    보    고    서

도시건설위원회

전문위원  박성균

아중천 수량 확보 및 생태하천 조성공사 개선요구 청원

검    토    보    고    서

1. 청원의 개요

청 원 인	소개의원	건 명	접수일
우아동 3가 412번지 진흥하이이츠@ 101 /103 임종훈	서윤근의원	아중천 수량 확보 및 생태하천 조성 공사 개선요구 청원	2009. 6. 8

2. 청원의 취지

◦ 최소한의 생태하천의 기능을 유지할 수 있을 수준의 적정하고도 지속적인 수량 유지에 대한 대책마련

◦ 안전을 위협하고 미관을 저해하는 진입 계단의 전면 교체와 재시공

(목재계단)

◦ 좁은 산책로의 확장 및 산책로 중간 중간의 시멘트 처리부분 수선

◦ 미관저해 차집관거 높이 조절시공의 전수시행

◦ 수생식물 등의 식재를 통한 유해잡초 제거

3. 근거 법규

◦ 지방자치법 제73조(청원서의 제출), 제75조(청원의 심사․처리)

◦ 전주시의회 청원심사 규칙 제2조(청원서 제출) 제6조(청원서 회부와 심사)

4. 검토의견

◦ 아중천 생태하천 조성 및 준설사업 사업개요

- 위   치 : 덕진구 우아동 아중리 복개종점 ~ 소양천 합류부

- 사업기간 : 2004 ~ 2009(6개년)

- 사 업 비 : 5,724백만원

- 사업내용 : 호안공 4.8㎞, 산책로 5.4㎞, 교량 2기, 취입보 6개소,

계단 24개소, 운동시설, 수생식물식재 3만주 등

- 추진상황 : 전체공정 70%

호안공 4.0㎞, 산책로 2.8㎞, 교량 2기, 취입보 4개소, 계단 14개소, 운동시설 4종 14개소, 수생식물식재 1.6만주 등

- 잔여공정 : 전체공정 30%

호안공 0.8㎞, 산책로 2.6㎞, 취입보 2개소, 계단 10개소,

수생식물식재 1.4만주 등

◦ 본 사업의 공정 70%가 진행중인 사업으로 진행중에 발생된 민원사항으로 하천의 유지수 확보, 돌계단 설치로 인한 이용에 불편 및 안전사고 위험 내포, 고수부지 협소로 인한 산책로 협소(1.5m, 참고로 전주천 및 삼천 2.0m), 미관저해 시설 제거, 수생식물 식재 및 유해 잡초제거 등 집행부에서 적극적인 자세로 검토 보완이 필요하며, 또한 시공이 완료한 부분이라도 수정 변경이 가능한지 법적 검토와 시공비 증가 부분에 대해서는 방안이 강구되어야 한다고 판단되므로 위원님들의 심도 있는 심사가 요구됩니다.