제267회 제2차 정례회

복지환경위원회

- 2010년도 세입‧세출 예산(안) -

주요사업설명서

상하수도사업소

상수도공기업특별회계

Ⅱ주요 세부사업 설명서

○ 특별회계

	【급수과 소관】
	ꊱ 약수터 시설보수	---	14
	노후불용관 정비 및 통합공사	---	15
	노후 배수관 교체 공사	---	16
	긴급누수 복구 및 누수탐사	---	17
	상수도 100% 공급사업	---	18
	상수도 전면개량을 통한 맑은 물 공급사업	---	19
	【수질관리과 소관】
	인후배수지 내부 도장 방수공사(3지)	---	20
	공업용수 도수관 PE 갱생공사	---	21
	상수도 시설물 정밀점검 용역	---	22

ꊱ 약수터 시설보수(사업명세서125쪽)

(급수과, 임춘호, 220-7831)

1. 사업목적 및 필요성

○ 약수터 관련 반복민원 제기(청와대외 23곳에 제기 -2007년 이후 4회)

○ 지정약수터로 관리 된지 20년이 지났으나 주변환경 열악하여 환경 개선하고 균일한 약수 배출

2. 사업근거 및 추진경위

○ 사업근거(국민권익위원회의 약수터 민원 관련 2010년도 환경정비 권고)

○ 사업수행주체(상하수도사업소 급수과)

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 전주시 완산구 동서학동 산57-1번지

○ 사업규모 : 약수터 정비 및 환경정비

○ 총사업비 : 50,000천원

○ 사업기간 : 2개월

○ 지원형태 : 직접수행

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 용역과제 심사 이행(  )   ○ 기  타( ○ )

5. 그간 추진사항

○ 2005년도 자외선 살균기 설치

○ 2006년도, 2008년도 배관수선

6. ‘10년 예산소요

○ 사 업 량 : 좁은목 약수터 석축보수 및 관로정비

○ 소요예산 : 50,000천원

7. 연도별 투자계획(신규)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘10년	‘11년 ~	비고
계		50		50
국비	국고보조
	균특회계
	특 교 세
도 비
시 비		50		50

노후불용관 정비 및 통합공사(사업명세서129쪽)

(급수과, 홍성진, 220-7841)

1. 사업목적 및 필요성

○ 각종 공사시 지하에 매설되어 남아있는 불용관 정비로 누수 방지

○ 기존 급수관이 노후되고 다발관으로 매설되어 있어 관로 통합 및 교체가 시급한       지역에 대하여 관로 통합공사 실시

2. 사업근거 및 추진경위

○ 각종 지하매설물 공사시 발생되는 다발관 등을 즉시 정비할 수 있도록 단가계약을 체결, 긴급을 요하는 공사에 즉시 시행하여 주민불편 최소화 및 예산낭비요인 사전 제거

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 전주시 일원

○ 사업규모 : 관로정비 L=300m

○ 총사업비 : 50백만원

○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12

○ 지원형태 : 직접수행

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 용역과제 심사 이행( 무 )

5. 그간 추진사항

○ 2009년 정비사항 L=500m

6. ‘10년 예산소요

○ 사 업 량 : 관로통합 L=300m

○ 소요예산 : 50백만원(시설비 49.6 , 부대비 4)

7. 연도별 투자계획(계속)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘10년	‘11년 ~	비고
계		50		50
국비	국고보조
	균특회계
	특 교 세
도 비
시 비		50		50

노후 배수관 교체 공사(사업명세서129쪽)

(급수과, 홍성진, 220-7841)

1. 사업목적 및 필요성

○ 노후배수관을 교체하여 맑은 물을 공급하고 누수로 인한 예산낭비 요인을 사전에 차단하여 상수도 경영 효율화에 기여코자 함

2. 사업근거 및 추진경위

○ 맑은물 공급사업 시행 외 지역 노후배수관을 교체하여 유수율 향상에 기여코자함

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 효자동 상산고교일원 및 인후3동 일원

○ 사업규모 : 노후관교체 1,510m

○ 총사업비 : 259백만원

○ 사업기간 : 2010. 2 ~ 2010. 11

○ 지원형태 : 직접수행

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 용역과제 심사 이행( 무 )

5. 그간 추진사항

○ 2009년 노후관교체 추진 1,100m

6. ‘10년 예산소요

○ 사 업 량 : 배수관교체 L=1,510m

○ 소요예산 : 259백만원(시설비 257, 부대비 2)

○ 사    유 : 맑은물 공급사업외 지역중 시급을 요하는 노후관 교체 우선시행

7. 연도별 투자계획(계속)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘10년	‘11년 ~	비고
계		259		259
국비	국고보조
	균특회계
	특 교 세
도 비
시 비		259		259

긴급누수 복구 및 누수탐사(사업명세서129쪽)

( 급수과, 모원일, 220-7843 )

1. 사업목적 및 필요성

○ 상수도 시설물에서 발생하는 돌발적인 누수를 효율적으로 긴급 복구함으로써  위험요소 제거 및 신속하게 수돗물을 수용가에게 공급

○ 누수탐사를 시행함으로써 누수지역을 사전에 확인, 복구하여 유수율 향상에 기여

2. 사업근거 및 추진경위

○ 유수율 제고사업 시행시 제외지역에 대한 유수율 향상에 기여코자함

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 전주시 일원

○ 사업규모 : 누수복구 및 탐사 400개소

○ 총사업비 : 390백만원

○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12

○ 지원형태 : 직접수행

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 용역과제 심사 이행( 무 )

5. 그간 추진사항

○ 2009년 900개소 정비추진

6. ‘10년 예산소요

○ 사 업 량 : 배수관교체 L=1,510m

○ 소요예산 : 390백만원(시설비 388, 부대비 2)

7. 연도별 투자계획(계속)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘10년	‘11년 ~	비고
계		390		390
국비	국고보조
	균특회계
	특 교 세
도 비
시 비		390		390

상수도 100% 공급사업(사업명세서 129쪽)

(급수과, 유인환, 220-7831)

1. 사업목적 및 필요성

○ 상수도 공급혜택을 받지 못하고 지하수나 간이상수도를 음용수로 사용하고 있는 전주시내 일부 농촌동 및 고지대 마을에 상수도를 공급하여 시민보건위생 개선

2. 사업근거 및 추진경위

○ 민선4기 공약사업의 일환으로 도･농간 지역균형발전과 주민들의 보건위생향상을 위하여 시행

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 전주시 관내

○ 사업규모 : 배수관 포설 154.2㎞, 가압장 신설 11개소

○ 총사업비 : 18,515백만원

○ 사업기간 : 1999.  ~ 2010

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 중기지방재정계획 반영(○)       ○ 투․융자 심사 이행(  )

○ 공유재산관리계획 승인(  )       ○ 용역과제 심사 이행(  )

5. 그간 추진사항

○ 2009년까지 추진사항

- 사 업 량 : 배수관 포설 145.3㎞, 가압장 신설 9개소

- 사 업 비 : 16,608백만원 (일반회계 6,870, 특별회계 9,738)

6. ‘10년 예산소요

○ 사 업 량 :배수관포설 (D=200 ~ 20mm)  L = 2.9Km

○ 소요예산 :650백만원(시설비 646, 부대비 4)

○ 사    유 :민선4기 공약사업으로 전주시내 일부 농촌동 및 고지대 마을에 상수도공급

7. 연도별 투자계획(계속)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘10년	‘11년 ~	비 고
계		18,515	16,608	650	1,257
국비	국고보조
	균특회계
	특 교 세
도 비
시 비		18,515	16,608	650	1,257

상수도 전면개량을 통한 맑은물 공급사업(사업명세서130쪽)

(급수과, 김정식, 220-7825)

1. 사업목적 및 필요성

○ 유수율 향상으로 상수도 경영의 합리화 도모

○ 선진화된 급수체계 구축으로 맑고 깨끗한 수돗물 공급

2. 사업근거 및 추진경위

○ 전주시 상수도 경영혁신 방안 및 유수율 제고 종합계획 수립

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 전주시 급수구역 일원

○ 사업규모 : 블록고립 128개소, 블록정비 50개소, 통합관리시스템 구축 1식

○ 총사업비 : 1,436억원(융자금 400, 일반회계 400, 특별회계 636)

○ 사업기간 : 2009. 3월 ~ 2014. 3월

○ 지원형태 : 직접수행

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 용역과제 심사 이행 완료      ○ 중앙 투․융자심의 이행 완료

5. 그간 추진사항

○ 공사 착공      -------------------------------------  2009. 3. 24

○ 사업명칭 변경  -------------------------------------  2009. 4.  1

○ 사업설명회 실시(10회)   ------------------------------  2009. 3 ~ 11월

※ 공사 추진상황(현공정 2.5%)

- 교동 한옥마을 부근 외 20개소 상수도관 30㎞ 매설

6. ‘10년 예산소요

○ 사 업 량 : 블록고립 16개소 및 블록정비 14개소 중 일부

○ 소요예산 : 3,529백만원(시설비 3,420, 감리비 100, 부대비 9)

○ 사    유 : 상수도 전면개량을 통한 맑은물 공급사업 예산 확보(계속비 사업)

7. 연도별 투자계획(계속)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘10년	‘11년 ~	비고
계		143,653	33,682	37,000	72,971
국비	국고보조
	균특회계
	특 교 세
도 비
시비	일반회계	40,000	5,000	10,000	25,000
	특별회계	63,653	14,583	17,000	32,070
기타 (융자금)		40,000	14,099	10,000	15,901

인후배수지 내부도장 방수공사(3지)(사업명세서158쪽)

(수질관리과, 김용호, 220-7871)

1. 사업목적 및 필요성

○ 배수지 내부콘크리트의 노후 및 부식작용 등으로 인한 구조물 내구성 저하로 누수 및 수질오염발생이 우려되어, 배수지 내부 콘크리트를 도장 방수함으로써 시민이 안심하고 마실 수 있는 맑고 깨끗한 물을 공급하고자 함

2. 사업근거 및 추진경위

○ 노후된 배수지 내부의 콘크리트 표면을 도장하여 구조물을 보호하고 안심하고        마실수 있는 수돗물 공급

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 우아동 3가 산97-5번지 (인후공원)

○ 사업규모 : 배수지 도장 3지 (A=10,236㎡)

○ 총사업비 : 600백만원(시설비 596, 부대비 4)

○ 사업기간 : 2010. 2～ 2010. 4 (3개월)

○ 지원형태 : 직접수행

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 해당 없음

5. 그간 추진사항

○ 인후배수지 1지 도장 완료 : 2009. 12

6. 연도별 투자계획(계속)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘09년	‘10년 ~	비고
계		770		170	600
국비	국고보조
	균특회계
	특 교 세
도 비
시 비		770		170	600

공업용수 도수관 PE 갱생공사(사업명세서158쪽)

(수질관리과, 김용호, 220-7871)

1. 사업목적 및 필요성

○ 매년 잦은 누수로 인한 돌발사고 발생시 공업용수 공급 차질을 방지하고   도수관 인접 농가의 민원을 해소

2. 사업근거 및 추진경위

○ 노후된 공업용수 도수관을 개량(PE갱생) 하여 안정적인 공업용수 공급 및

생산성 향상에 기여

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 전미동 일원

○ 사업규모 : 도수관 (D700mm) 개량(PE갱생)

○ 총사업비 : 230백만원(시설비 229, 부대비 1)

○ 사업기간 : 2010. 3～ 2010. 4 (2개월)

○ 지원형태 : 직접수행

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 해당 없음

5. 그간 추진사항

○ ′08. ～′09까지 도수관 개량 (PE갱생) : 총 3,825m중 1,097m완료

6. 연도별 투자계획(계속)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘09년	‘10년 ~	‘11년 이후
계		2,101	270	271	230	1,330
국비	국고보조
	균특회계
	특 교 세
도 비
시 비		2,101	270	271	230	1,330

상수도시설물 정밀점검 용역(사업명세서158쪽)

(수질관리과, 김용호, 220-7871)

1. 사업목적 및 필요성

○ 시설물 안전관리에 관한 특별법의 규정에 의거 취․정수장 안전점검과 적정한

유지관리를 통하여 재해 재난 예방 및 시설물의 효용성을 증진시켜 맑고

깨끗한 수돗물 생산 공급

2. 사업근거 및 추진경위

○ 상수도시설물 2년에 1회 이상 정밀점검 용역 시행 : 법적 이행사무

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 대성정수장 등 12개 시설

○ 사업규모 : 상수도시설물 정밀점검 용역 1식

○ 총사업비 : 70백만원

○ 사업기간 : 2010. 5～ 2010. 6 (2개월)

○ 지원형태 : 용역

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 해당 없음

5. 그간 추진사항

6. 연도별 투자계획(계속)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘09년	‘10년 ~	‘11년 이후
계		120		50	70
국비	국고보조
	균특회계
	특 교 세
도 비
시 비		120		50	70

하수도공기업특별회계

Ⅱ 주요 세부사업 설명서

1. 하 수 과 소관

	ꊱ 하수처리 편입구역 하수관거사업	-----	35
	중앙처리구역 하수관거 정비사업	-----	36
	효자처리구역 하수관거정비사업	-----	37
	농촌마을 하수도정비사업(매암,진기,신중지구)	-----	38
	하수관거 신설 ․개량사업(완산구)	-----	39
	ꊶ 하수도 유지관리사업(완산구)	-----	40
	하수관거 신설 ․개량사업(덕진구)	-----	41
	하수도 유지관리사업(덕진구)	-----	42
	하수처리장기계․전기 등 노후설비 교체공사	-----	43
	완주군 상관지역 유입하수 측정 유량계설치	-----	44
	하수처리장 시설물 및 찻집관로 유지공사	-----	45
	마을하수도처리시설 개량 및 보수	-----	46
	전주하수처리장 총인처리시설	-----	47
	하수처리장 생물반응조 덮개설치사업	-----	48
	하수관거 BTL사업 시설임대료	-----	49
	하수관거 BTL사업 민간위탁운영비	-----	50

ꊱ 하수처리 편입구역 하수관거사업 (267쪽)

(하수과, 이윤승, 220-7792)

1. 사업목적 및 필요성

○ 도심하천 상류지역의 생활오수를 차집하여 하수처리장에 유입

○ 공공수역 수질오염 방지로 하천의 쾌적한 수변공간 제공

○ 농촌동 마을하수도 개량으로 시민 보건위생 증진

2. 사업근거 및 추진경위

○ 사업근거 : 하수도법 제11조(공공하수도 설치)

○ 하수도정비 기본계획변경승인(환경부) --------------------------- ‘07.07

○ 지방재정 투융자심사(행정자치부) ------------------------------- ‘07.10

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 평화동 장교마을 등 48개마을

○ 사업규모 : 하수관거설치 L=76.4㎞

○ 총사업비 : 42,632백만원(국비 21,316,  지방비 21,316)

○ 사업기간 : 2007 ~ 2011(5개년)

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 중기지방재정계획 반영(○)       ○ 투․융자 심사 이행  (○)

○ 공유재산관리계획 승인(  )       ○ 용역과제 심사 이행(○)

5. 그간 추진사항

○ 실시설계용역 보완 완료 ---------------------------------------  ‘08.08

○ 행정절차이행 (재원협의, 설계자문등) --------------------------  ‘08.08

○ 공사추진(4개지구 : 중복․전주천,평화,중인,박물관지구) --  ‘08.10～’09.11

- 하수관거 L=76.4㎞ 중 9.4㎞ 완료

6. ‘10년 예산소요

○ 사 업 량 : 하수관거 L=10㎞

○ 소요예산 : 3,836백만원(국비 3,070,  지방비 766)

- 시설비 3,432,  감리비 400,  부대비 4

○ 사    유 : 장기계속사업(국고보조사업)

7. 연도별 투자계획(계속)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘10 년	‘11 이후	비 고
계		42,632	8,477	3,836	30,319
국비	국고보조	21,316	4,441	3,070	13,805
	균특회계
	특 교 세
시 비		18,119	3,110		15,009
기 금		3,197	926	766	1,505

ꊲ 중앙처리구역 하수관거정비사업 (268쪽)

(하수과, 이윤승, 220-7792)

1. 사업목적 및 필요성

○ 새만금 상류지역의 하천수질을 조기에 개선하여 만경강 생태계를 복원,

성공적인 새만금사업 추진에 기여하고

○ 진행중인 노송천, 건산천 자연형하천 복원사업 구간의 시너지효과 극대화로

시민에게 생명력 있는 수변공간 제공

○ 하천수, 지하수, 우수등 불명수 감소로 인한 하수처리 경영 합리화

2. 사업근거 및 추진경위

○ 사업근거 : 하수도법 제11조(공공하수도 설치)

○ 하수도정비 기본계획변경승인(환경부) --------------------------- ‘07.07

○ 지방재정 투융자심사(전라북도) --------------------------------- ‘08.10

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 완산구 풍남동,교동,노송동일원

○ 사업규모 : 우․오수관거정비 L=27.6㎞

○ 총사업비 : 30,000백만원(국비 15,000,  지방비 15,000)

○ 사업기간 : 2009 ~ 2012(4개년)

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 중기지방재정계획 반영(○)       ○ 투․융자 심사 이행  (○)

○ 공유재산관리계획 승인(  )       ○ 용역과제 심사 이행(○)

5. 그간 추진사항

○ 실시설계용역 완료 및 행정절차 이행 ---------------------------- ’09.10

○ 공사발주(조달청 의뢰) ----------------------------------------- ‘09.11

6. ‘10년 예산소요

○ 사 업 량 : 하수관거정비 L=8.0㎞

○ 소요예산 : 2,818백만원(국비 2,346, 지방비 472)

- 시설비 2,413,  감리비 400,  부대비 5

○ 사    유 : 장기계속사업(국고보조사업)

7. 연도별 투자계획(신규)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘10 년	‘11 이후	비 고
계		30,000	1,450	2,818	25,732
국비	국고보조	15,000	374	2,346	12,280
	균특회계
	특 교 세
시 비		12,750	1,002		11,748
기 금		2,250	74	472	1,704

ꊳ 효자처리구역 하수관거정비사업 (268쪽)

(하수과, 이윤승, 220-7792)

1. 사업목적 및 필요성

○ 새만금 상류지역의 하천수질을 조기에 개선하여 만경강 생태계를 복원,

성공적인 새만금사업 추진에 기여하고

○ 공공수역 수질오염 방지로 하천의 쾌적한 수변공간 제공

○ 하천수, 지하수, 우수등 불명수 감소로 인한 하수처리 경영 합리화

2. 사업근거 및 추진경위

○ 사업근거 : 하수도법 제11조(공공하수도 설치)

○ 지방재정 투융자심사(전라북도) --------------------------------- ‘09.10

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 완산구 효자동, 송천동 처리장 주변마을

○ 사업규모 : 우․오수관거정비 L=25.0㎞

○ 총사업비 : 20,000백만원(국비 10,000,  지방비 10,000)

○ 사업기간 : 2010 ~ 2013(4개년)

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 중기지방재정계획 반영(○)       ○ 투․융자 심사 이행  (○)

○ 공유재산관리계획 승인(  )       ○ 용역과제 심사 이행(○)

5. 그간 추진사항

○ 중기지방재정계획 및 투․융자심사 -------------------------------- ’09.10

○ 용역과제 심사 완료 -------------------------------------------- ‘09.11

6. ‘10년 예산소요

○ 사 업 량 : 실시설계용역 1식

○ 소요예산 : 100백만원(지방비 100)  - 시설비 100

○ 사    유 : ‘10년 신규사업으로 국회예결위 심의중(환경부 사전설계 요구)

7. 연도별 투자계획(신규)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘10 년	‘11 이후	비 고
계		20,000		100	19,900
국비	국고보조	10,000			10,000
	균특회계
	특 교 세
시 비		8,500		49	8,451
기 금		1,500		51	1,449

ꊴ 농촌마을 하수도 정비사업(매암, 진기, 신중지구)(268쪽)

(하수과, 김춘식, 220-7795)

1. 사업목적 및 필요성

○ 농촌지역의 열악한 주건환경을 개선하여 주민생활 편익도모

○ 공공수역의 수질개선과 지역주민의 보건위생 향상에 기여

2. 사업근거 및 추진경위

○ 사업근거 : 하수도법 제11조(공공하수도 설치)

○ 하수도정비 기본계획변경승인(환경부) --------------------------- ‘07.07

○ 지방재정 투융자심사 (전북도, 전주시) -------------------------- ‘08.11

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 매암외 2개지구(진기, 신중)

○ 사업규모 : 처리시설 Q= 475㎥/일(매암 190, 진기  90, 신중 195)

하수관거 L= 22.7㎞  (매암 8.7,  진기 6.5, 신중 7.5)

○ 총사업비 : 13,671백만원(국비 9,570  지방비 4,101)

○ 사업기간 : 2009 ~ 2012(4개년)

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 중기지방재정계획 반영(○)       ○ 투․융자 심사 이행  (○)

○ 공유재산관리계획 승인(  )       ○ 용역과제 심사 이행(○)

5. 그간 추진사항

○ 지방재정 투융자 심사 완료  -----------------------------------  ‘08.11

○ 매암 및 진기지구 실시설계용역 완료  --------------------------  ‘09.09

○ 매암지구 인가완료 및 공사발주  -------------------------------  ‘09.11

○ 신중지구 용역과제 심의완료  ----------------------------------  ‘09.11

○ 진기지구 인가신청  -------------------------------------------  ‘09.12

6. ‘10년 예산소요

○ 사 업 량 : 처리시설 Q= 475㎥/일, 하수관거 L= 22.7㎞

○ 소요예산 : 745백만원(국비 500,  지방비 245)

○ 사    유 : 신규, 국비보조사업으로 책정

7. 연도별 투자계획(신규/계속)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘10년	‘10년 이후	비 고
계		13,671	845	745	12,081
국비	국고보조	9,570	592	500	8,478
	균특회계
	특 교 세
시 비		3,486	203	196	3,087
기 금		615	50	49	516

하수관거 신설 ․ 개량사업(269쪽)

(완산구청 건설과 하수도관리담당 장의환 220-5441)

1. 사업목적 및 필요성

○ 노후화된 하수시설 및 하수도 미설치 지역등 배수가 원활하지 않은 지역을 개량하여 상습침수 해소 및 쾌적한 도시환경을 조성하고자 함

2. 사업근거 및 추진경위

○ 사업추진 대상

- 관리대상 하수관거 연장 L= 685㎞(완산구 하수처리구역)

○ 사업추진방향

- 하수도 노후파손, 시설기준 미달 등 배수불량지역 및 장마철 상습피해 침수지역 민원다발지역 등 우선 추진

※ 농촌동 및 기 시행중인 하수처리편입구역 및 중앙처리구역 제외

○ 사업수행 주체 : 완산구청 건설과

○ 사업진행 절차

1차 수요조사 (동 협조)	⇒	우선사업 대상지 조사	⇒	실시설계	⇒	사업추진
(‘09.10.~12.)		(09.12~10.01) 350백만원		(10.02~04)		(10.05~12)

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 완산구 관내 하수도 개량 대상 지역

○ 사업규모 : 하수도 시설개량 L = 1,000ｍ(D300~D800㎜)

○ 총사업비 : 350,000천원,      ○ 사업기간 : 2010. 2. ~ 12.

○ 지원형태 : 직접수행

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 해당 없음

5. 그간 추진사항

○ 2010년 하수도 시설개량 사업 수요조사  : 2009. 09. ~ 12.

6. ‘10년 예산소요

○ 사 업 량 : 하수도 시설개량 L = 1,000ｍ(D300~D800㎜)

○ 소요예산 : 350,000천원

○ 사    유 : 2010년 예산 확보액 범위내에서 우선 시급한 구간 시행

하수도 유지관리 사업 (269쪽)

【긴급보수200, 준설250, 우수받이신설및맨홀보수100, 악취방지시설50】

(완산구청 건설과 하수도관리담당 장의환 220-5441)

1. 사업목적 및 필요성

○ 장마철 및 집중호우로 인하여 배수불량, 하수도 막힘, 시설물 파손, 노면물고임 지역등에 대하여 시설물보수 및 하수도준설을 실시하여 하수도 시설물 유지관리에 만전을 기함으로써 시민들의 생활불편을 해소 및 사전 재해 예방

2. 사업근거 및 추진경위

○ 사업추진 대상

- 관리대상 하수관거 연장 L= 685㎞(완산구 하수처리구역)

○ 사업추진방향

- 관로 긴급사공에 대한 응급복구

- 우․오수 역류지역 : 퇴적토사 및 슬러지로 통수단면 부족구간

- 노면수 배수처리시설 불량지역 및 맨홀 파손구간

- 우․오수 합류식 지역중 주택지역 악취발생구간에 대하여 악취방지시설 설치

○ 사업수행 주체 : 완산구청 건설과

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 완산구 관내

○ 사업규모 : 하수도 유지관리 L = 685㎞

- 긴급보수 200개소,                   - 하수도 준설      20개소 / 15㎞,

- 우수받이신설 및 맨홀보수 100개소,   - 악취방지시설 설치 50개소

○ 총사업비 : 600,000천원,      ○ 사업기간 : 2010. 2. ~ 12.

○ 지원형태 : 직접수행

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 해당 없음

5. 그간 추진사항

○ 2010년 하수도시설 개량사업 수요조사 : 2009.09 ~ 12

6. ‘10년 예산소요

○ 사 업 량

- 긴급보수 200개소,                   - 하수도 준설      20개소 / 15㎞,

- 우수받이신설 및 맨홀보수 100개소,   - 악취방지시설 설치 50개소

○ 소요예산 : 600,000천원

하수관거 신설 ․ 개량사업 및 우수BOX설치공사 (269쪽)

(덕진구청 건설과 하수도관리담당 이상복 270-6471)

1. 사업목적 및 필요성

○ 노후화된 하수시설 및 하수도 미설치 지역등 배수가 원활하지 않은 지역을 개량하여 상습침수 해소 및 쾌적한 도시환경을 조성하고자 함

2. 사업근거 및 추진경위

○ 사업추진 대상

- 관리대상 하수관거 연장 L= 583㎞(덕진구 하수처리구역)

○ 사업추진방향

- 하수도 노후파손, 시설기준 미달 등 배수불량지역 및 장마철 상습피해 침수지역 민원다발지역 등 우선 추진

○ 사업수행 주체 : 덕진구청 건설과

○ 사업진행 절차

1차 수요조사 (동 협조)	⇒	우선사업 대상지 조사	⇒	실시설계	⇒	사업추진
(‘09.10.~11.)		(09.12~10.01) 520배만원		(10.02~04)		(10.05~12)

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 덕진구 관내 상습 침수지역 및 대학병원옆 부근

○ 사업규모 : 하수도시설개량 및 우수BOX (L=1,200ｍ D500~2@3.0×2.0)

○ 총사업비 : 520,000천원,      ○ 사업기간 : 2010. 2. ~ 12.

○ 지원형태 : 직접수행

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 해당 없음

5. 그간 추진사항

○ 2010년 하수도 시설개량 사업 수요조사  : 2009. 10. ~ 12.

6. ‘10년 예산소요

○ 사 업 량 : 하수도 시설개량 및 우수BOX(L=1,200ｍ D500~2@3.0×2.0)

○ 소요예산 : 520,000천원

○ 사    유 : 2010년 예산 확보액 범위내에서 우선 시급한 구간 시행

하수도 유지관리사업 (269쪽)

【긴급보수200, 준설254, 우수받이신설및맨홀보수100, 악취방지시설50】

(덕진구청 건설과 하수도관리담당 이상복 270-6471)

1. 사업목적 및 필요성

○ 장마철 및 집중호우로 인하여 배수불량, 하수도 막힘, 시설물 파손, 노면물고임 지역등에 대하여 시설물보수 및 하수도준설을 실시하여 하수도 시설물 유지관리에 만전을 기함으로써 시민들의 생활불편을 해소 및 사전 재해 예방

2. 사업근거 및 추진경위

○ 사업추진 대상

- 유지관리 연장 하수도시설 L= 583㎞(덕진구 하수처리구역)

○ 사업추진방향

- 관로 긴급사공에 대한 응급복구

- 우․오수 역류지역 : 퇴적토사 및 슬러지로 통수단면 부족구간

- 노면수 배수처리시설 불량지역 및 맨홀 파손구간

- 우․오수 합류식 지역중 주택지역 악취발생구간에 대하여 악취방지시설 설치

○ 사업수행 주체 : 덕진구청 건설과

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 덕진구 관내

○ 사업규모 : 하수도 유지관리 L = 583㎞

- 긴급보수 200개소,                   - 하수도 준설      20개소 / 15㎞,

- 우수받이신설 및 맨홀보수 100개소,   - 악취방지시설 설치 50개소

○ 총사업비 : 604,120천원,      ○ 사업기간 : 2010. 2. ~ 12.

○ 지원형태 : 직접수행

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 해당 없음

5. 그간 추진사항

○ 2010년 하수도 유지관리사업 수요조사(긴급보수, 우수받이신설) : 2009.09~12

6. ‘10년 예산소요

○ 사 업 량

- 긴급보수 200개소,                   - 하수도 준설      20개소 / 15㎞,

- 우수받이신설 및 맨홀보수 100개소,   - 악취방지시설 설치 50개소

○ 소요예산 : 604,120천원

하수처리장 기계.전기 등 노후설비 교체공사(272쪽)

(하수과, 한복수, 220-7797)

1. 사업목적 및 필요성

○ 내구연한이 경과된  노후시설에 대하여 대수선공사 실시로 하수처리시설의       효율 제고 및 안정적 방류수질 확보

2. 사업근거 및 추진경위

○ 전주시와 전주개발(주)간의 변경(2차)협약(‘07.10.5)제45조⑧ 및 ⑨항의

내구년한이 경과한 시설물은 전주시에서 부담하여 교체

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 송천동 2가 1035번지

○ 사업규모 : 기계 및 전기 등 노후설비 시설교체 1식

○ 총사업비 : 607백만원

○ 사업기간 : ‘10. 1 ~ ’10. 12

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 중기지방재정계획 반영(  )       ○ 투․융자 심사 이행  (  )

○ 공유재산관리계획 승인(  )       ○ 용역과제 심사 이행(  )

5. ‘10년 예산소요

○ 사 업 량 : 기계 및 전기시설교체 1식,

○ 소요예산 : 607백만원

○ 사    유 : 환경사업소 노후된 시설물 교체

6. 연도별 투자계획(신규/계속)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘10 년	‘11 이후	비 고
계		607		607
국비	국고보조
	균특회계
	특 교 세
도 비
시 비		607		607

완주군 상관지역 유입하수 측정 유량계설치(272쪽)

(하수과, 한복수, 220-7797)

1. 사업목적 및 필요성

○ 완주군 상관지역에 유입하수에 대하여 월암교 부근에 고정식 유량계를 설치하여 유입하수 발생량 산출 확보

2. 사업근거 및 추진경위

○ 전주시와 완주군이 상관지역 하수처리구역 편입에 따른 협약(‘’07.10.11) 제7조에 의거 고정식 유량계를 전주시에서 부담하여 설치

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 완주군 상관면 월암교 부근

○ 사업규모 : 고정식 유량계 1식

○ 총사업비 : 50백만원

○ 사업기간 : ‘10. 1 ~ ’10. 12

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 중기지방재정계획 반영(  )       ○ 투․융자 심사 이행  (  )

○ 공유재산관리계획 승인(  )       ○ 용역과제 심사 이행(  )

5. 그간 추진사항

○ 완주군과 협약 : ‘07. 10. 11

6. ‘10년 예산소요

○ 사 업 량 : 고정식 유량계 설치 1식,

○ 소요예산 : 50백만원

○ 사    유 : 하수유입량 산출에 따른 유량계 설치

7. 연도별 투자계획(신규/계속)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘10 년	‘11 이후	비 고
계		50		50
국비	국고보조
	균특회계
	특 교 세
도 비
시 비		50		50

하수처리장 시설물 및 차집관로 유지공사(272쪽)

(하수과, 김춘식, 220-7795)

1. 사업목적 및 필요성

○ 공공하수도 에서 하수처리장으로 연결되는 차집관로에 불명수가 유입되어 이를 방지하기 위한 보수공사 추진으로 하수처리비용 증가요인 제거 및 차집관로 관리에 만전을 기함고자 함

2. 사업근거 및 추진경위

○ 공공하수도 시설물 유지관리을 위한 보수 공사 추진

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 전주하수처리장 차집관로 등

○ 사업규모 : 차집관로 유지보수 1식

○ 총사업비 : 100백만원

○ 사업기간 : ’10. 1 ~ 12

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 중기지방재정계획 반영(  )       ○ 투․융자 심사 이행  (  )

○ 공유재산관리계획 승인(  )       ○ 용역과제 심사 이행(  )

5. ‘10년 예산소요

○ 사 업 량 : 차집관로 보수 1식

○ 소요예산 : 100백만원

○ 사    유 : 하수처리장 차집관로 불명수 방지 등 시설물 보수

6. 연도별 투자계획(신규/계속)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘10 년	‘11 이후	비 고
계		100		100
국비	국고보조
	균특회계
	특 교 세
도 비
시 비		100		100

마을하수처리시설 개량 및 보수(삼천외 11개소)(272쪽)

(하수과, 김춘식, 220-7795)

1. 사업목적 및 필요성

○ 공공수역의 수질개선과 지역주민의 보건위생 향상을 위한 설치한 농촌마을 공공하수처리시설 개량 및 보수공사 추진으로 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

2. 사업근거 및 추진경위

○ 농촌마을 공공하수처리시설 개량 및 유지보수 공사 추진

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 덕진구 금상동 삼천외 11개소

○ 사업규모 : 마을하수처리시설 개량 및 보수 1식

○ 총사업비 : 120백만원

○ 사업기간 : ’10. 1 ~ 12

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 중기지방재정계획 반영(  )       ○ 투․융자 심사 이행  (  )

○ 공유재산관리계획 승인(  )       ○ 용역과제 심사 이행(  )

5. 그간 추진사항

○ 전주시 관내 마을하수처리시설 현지조사 : ‘09. 10 ~ 11

6. ‘10년 예산소요

○ 사 업 량 : 마을하수처리시설 개량 및 보수 1식

○ 소요예산 : 120백만원

○ 사    유 : 마을하수처리시설 유지관리를 위한 개량 및 보수

7. 연도별 투자계획(신규)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘10 년	‘11 이후	비 고
계		120		120
국비	국고보조
	균특회계
	특 교 세
도 비
시 비		120		120

전주하수처리장 총인처리시설(273쪽)

(하수과, 김춘식, 220-7795)

1. 사업목적 및 필요성

○ 새만금 기본구상 변경으로 목표수질 달성을 위한 총인 삭감 필요

○ 새만금 유역이 담수화 될 경유 부영양화에 의한 조류 발생 사전예방

○ 공공수역에서의 부영양화 방지 등 새만금 상류지역의 단계적 수질기준 설정

2. 사업근거 및 추진경위

○ 환경부 국가시책 사업으로 환경부 추진

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 송천동 2가 1035번지 하수처리장 내

○ 사업규모 : 약품자동투입설비 1개소, 가압부상조시설 1개소

○ 총사업비 : 25,000백만원(국비 12,500, 지방비 12,500)

○ 사업기간 : ’10. 1 ~ ’12(3개년)

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 중기지방재정계획 반영(  )       ○ 투․융자 심사 이행  (  )

○ 공유재산관리계획 승인(  )       ○ 용역과제 심사 이행(  )

5. 그간 추진사항

○ 인처리 설비 기준설정을 위한 연구용역 시행(환경부)  ---------  ‘09.09

6. ‘10년 예산소요

○ 사 업 량 : 기본 및 실시설계 1식

○ 소요예산 : 500백만원

○ 사    유 : 신규, 국비보조사업 책정

7. 연도별 투자계획(신규)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘10 년	‘11 이후	비 고
계		25,000		500	24,500
국비	국고보조	12,500		500	12,000
	균특회계
	특 교 세
도 비
시 비		12,500			12,500

하수처리장 생물반응조 덮개설치사업(273쪽)

(하수과, 김춘식, 220-7795)

1. 사업목적 및 필요성

○ 하수처리장에 적합한 악취방지 시설을 설치하여 인근 주민들의 악취민원을 해소

○ 하수처리장이 혐오시설이라는 인식에서 탈피 환경보전 체험교육장으로 활용

2. 사업근거 및 추진경위

○ 하수처리장 인근 주민 악취민원 해소 및 하수처리장 혐오시설 개선

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 송천동2가 환경사업소 내

○ 사업규모 : 생물반응조 덮개(1,2단계) 5,600㎡ 및 악취방지 1식

○ 총사업비 : 3,587백만원(덮개 1,733 탈취기 752 배관 997 전기 105)

○ 사업기간 : 2008. 10 ~ 2010. 10(3개년)

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 중기지방재정계획 반영(○)       ○ 투․융자 심사 이행   (○)

○ 공유재산관리계획 승인(  )       ○ 용역과제 심사 이행 (○)

5. 그간 추진사항

○ 용역완료  --------------------------------------------------  ‘09.02

○ 덮개시설 구매설치 착공  ------------------------------------  ‘09.07

○ 탈취기 구매설치 착공  --------------------------------------  ‘09.09

○ 배관공사 착공  ---------------------------------------------  ‘09.10

○ 전기공사 착공  ---------------------------------------------  ‘09.11

6. ‘10년 예산소요

○ 사 업 량 : 생물반응조 덮개 1식

○ 소요예산 : 100백만원

○ 사    유 : 2단계 생물반응조 잔여분 덮개시설 소요사업비

7. 연도별 투자계획(계속)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘10 년	‘11 이후	비 고
계		3,587	3,487	100
국비	국고보조
	균특회계
	특 교 세
도 비
시 비		3,587	3,487	100

하수관거BTL사업 시설임대료(274쪽)

(하수과, 최기훈, 220-7793)

1. 사업목적 및 필요성

○ 새만금 상류지역의 하천수질을 조기에 개선하여 만경강 생태계를 복원,

성공적인 새만금사업 추진에 기여하고

○ BTL(Build-Transfer-Lease 건설-양도-임대)사업은 임대형민자사업 으로 민간의 자본과 기술을 도입하여 조기에 하수관거시설을 정비, 경제적이고 효율적인 운영관리를 통해 지하수․방류수역의 오염방지와 하수처리장 처리효율 제고 등을 도모하여 시민의 삶의 질 향상

○ 사업시행자 운영기간(20년) 동안 시설임대료 및 운영비 지급

2. 사업근거 및 추진경위

○ 사업근거 : 사회기반시설에 대한 민간투자법․시행령, 민간투자사업기본계획

○ 하수관거BTL사업 협약(환경부, 전주시, 환경관리공단) ---------- ‘05.05.

○ 하수관거BTL사업 실시협약(전주시. 환경관리공단, 사업시행자) -- ‘06.03.

3. 사 업 개 요

○ 위       치 : 덕진구 송천동외 10개동(덕진, 아중, 중앙, 화산, 효자처리구역)

○ 사 업 규 모 : 우․오수관거정비 L=127㎞, 배수설비 9,241세대

○ 투자사업비 : 107,361백만원(민간투자비, ‘05. 6월기준 불변가격)

○ 사 업 기 간 : 2006. 4. ~ 2010. 5. (5개년)

○ 사업시행자 : 전주아랫물길주식회사(시공자 : GS건설외 5개사)

○ 임 대 금 액 : 228,000백만원(국비 114,000  지방비 114,000)

○ 임 대 기 간 : 2010. 6. ~ 2030. 5. (20년)

4. 그간 추진사항

○ 실시계획승인 및 공사 착공 ------------------------------------ ’06.04.

○ 사업완료(현공정 99.1%) ------------------------------------- ‘10.05.

5. ‘10년 예산소요

○ 임대료 지급 : ‘10. 6. ～ ’10. 12.(분기별 지급)

○ 소 요 예 산 : 5,640백만원(국비 3,755 지방비 1,885)

○ 사       유 : 민간투자법에 의한 완료사업으로 20년동안 시설임대료 지급

6. 연도별 투자계획(신규)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘10 년	‘11 이후	비 고
계		228,000	0	5,640	222,360
국비	국고보조	114,000		3,755	110,245
	균특회계	0
	특 교 세	0
시 비		114,000		1,885	112,115
기 금

하수관거BTL사업 민간위탁운영비(254쪽)

(하수과, 최기훈, 220-7793)

1. 사업목적 및 필요성

○ 새만금 상류지역의 하천수질을 조기에 개선하여 만경강 생태계를 복원,

성공적인 새만금사업 추진에 기여하고

○ BTL(Build-Transfer-Lease 건설-양도-임대)사업은 임대형민자사업 으로 민간의 자본과 기술을 도입하여 조기에 하수관거시설을 정비, 경제적이고 효율적인 운영관리를 통해 지하수․방류수역의 오염방지와 하수처리장 처리효율 제고 등을 도모하여 시민의 삶의 질 향상

○ 사업시행자 운영기간(20년) 동안 시설임대료 및 운영비 지급

2. 사업근거 및 추진경위

○ 사업근거 : 사회기반시설에 대한 민간투자법․시행령, 민간투자사업기본계획

○ 하수관거BTL사업 협약(환경부, 전주시, 환경관리공단) ---------- ‘05.05.

○ 하수관거BTL사업 실시협약(전주시. 환경관리공단, 사업시행자) -- ‘06.03.

3. 사 업 개 요

○ 위       치 : 덕진구 송천동외 10개동(덕진, 아중, 중앙, 화산, 효자처리구역)

○ 사 업 규 모 : 우․오수관거정비 L=127㎞, 배수설비 9,241세대

○ 투자사업비 : 107,361백만원(민간투자비, ‘05. 6월기준 불변가격)

○ 사 업 기 간 : 2006. 4. ~ 2010. 5. (5개년)

○ 사업시행자 : 전주아랫물길주식회사(시공자 : GS건설외 5개사)

○ 운 영 금 액 : 16,609백만원(시비 16,609)

○ 운 영 기 간 : 2010. 6. ~ 2030. 5. (20년)

4. 그간 추진사항

○ 실시계획승인 및 공사 착공 ------------------------------------ ’06.04.

○ 사업완료(현공정 99.1%) ------------------------------------- ‘10.05.

5. ‘10년 예산소요

○ 운영비 지급 : ‘10. 6. ～ ’10. 12.(분기별 지급)

○ 소 요 예 산 : 400백만원(시비 400)

○ 사       유 : 민간투자법에 의한 완료사업으로 20년동안 운영비 지급

6. 연도별 투자계획(신규)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘10 년	‘11 이후	비 고
계		16,609	0	400	16,209
국비	국고보조	0
	균특회계	0
	특 교 세	0
시 비		16,609		400	16,209
기 금