제267회 전주시의회 제2차정례회

2009년도 행정사무감사특별위원회

2009년도

주요업무 추진상황 보고

상하수도 사업소

보  고  순  서

□	일 반 현 황		-------	1
□	부 서 별 주 요 기 능		-------	2
□	기 본 현 황		-------	3~7
□	주요업무 추진상황		-------	8
	○	수 도 행 정 과	-------	9~11
	○	급 수 과	-------	12~17
	○	수 질 관 리 과	-------	18~23
	○	하 수 과	-------	24~33

일  반  현  황

□ 기   구 : 4과 13담당(1전산실, 1시험소, 1센터, 17사업장)

																																																								상하수도 사업소
			수도행정과																																					급 수 과																																	수질관리과																				하 수 과
	수도행정							요금							체납징수																						유수율제고										급수시설											누수방지					계량기관리											수질관리					수질분석						생산관리								하수행정			하 수 시설			하수정비
	전산실							누 수 신고 센 터						계량기시험소								방수리취수장			삼천취수장								원당취수장				전미취수장									상관취수장																							인후배수지		천마배수지			효자배수지			완산배수지		송천배수지				서신배수지					금암배수지			화산배수지				대성정수장	지곡정수장		상관정수장	팔복정수장

□ 정‧현원

부 서 직 급		정 원	현 원
			계	수도행정과	급 수 과	수질관리과	하 수 과
합 계		98	95	24	27	32	12
일반직	소 계	55	55	11	16	16	12
	4급	1	1	1
	5급	4	4	1	1	1	1
	6급	13	12	3	4	2	3
	7급	22	32	5	6	13	8
	8~9급	15	6	1	5	-	-
연 구 사		4	4	-	-	4	-
기 능 직		39	36	13	11	12	-

※ 청경 15명,  상용직 23명

부서별 주요기능

과 별	분 장 사 무	비 고
수도행정과	• 상수도사업 경영혁신 및 경영평가 • 지방채 및 자치법규 제․개정 • 계약 및 물품관리 • 상수도사용료 부과징수 업무 • 검침업무 위탁관리, 실사 이의신청 처리 • 세입현계, 과오납, 자동납부신청, 환불, 누수감액 • 공기업특별회계 금고계약 및 관리
급 수 과	• 유수율제고 중․장기 계획 • 급수공사 신청서 접수 및 승인 • 노후급수관 교체 및 통합공사 • 상수도 전면개량을 통한 맑은물 공급사업 • 배수관 및 급수관 시설공사 • 누수탐사 및 누수복구 • 누수신고센터 운영관리 • 마을 상수도 유지관리 • 수전관리, 수도계량기 교체 • 계량기 실태조사 및 관리
수질관리과	• 생활용수 수요에 따른 정․원수 확보 • 광역상수도 수급에 관한 업무 전반 • 취․정수장 배수지 등 사업장 시설 유지관리 • 먹는 물 공동시설(지정약수터) 수질검사 • 사업장 시설물 유지관리 • 국가공인 수질검사기관 운영관리 • 공업용수 수급 및 유지보수
하 수 과	• 하수도공기업특별회계 세입 세출예산 및 결산 • 하수도사용료 조정 및 징수관리 • 금강수계관리기금 업무 • 하수관거 정비사업 • 하수관거정비 민간투자(BTL)사업 • 마을하수도 시설 및 유지관리 • 하수처리장 운영관리 및 시설물 유지관리

기  본  현  황

□ 급수 인구

총인구	급수인구	보급율 (%)	1일 1인 급수량(ℓ)	급수전	유수율(%)	무수율(%)	비고
640,017명	634,897명	99.2	403	193,855	61.3	38.7

□ 수계별 생산 및 급수구역

구 분			시설용량 (천㎥/일)	급수량 (천㎥/일)	급 수 지 역	급수인구	비율 (%)
총 계			328	295		634,897	100
생활용수	합 계		258	255	33개동	634,897	100
	자체상수도	대 성	40	35	동․서서학, 중화산1, 완산, 효자1일부, 삼천1일부, 평화1.2일부	82,537	13
	광역상수도	전주권	218	220	중앙,풍남,노송, 서신, 삼천1일부. 2. 3, 중화2, 평화1.2일부, 효자1일부.2. 3. 4, 진북, 인후1.2.3, 금암1.2, 덕진, 우아1.2, 호성, 팔복, 송천1.2, 조촌, 동산.	552,360	87
공업 용수	팔복정수장		70	40	팔복동 1, 2공단(18개 업체 공급)

※ 생활용수 급수구역은 생산량 및 수요량에 따라 조절

□ 도․송․배․급수관

〔단위 : ㎞〕

총 연 장	도․송수관	배 수 관	급 수 관	비 고
2,153	57	693	1,403

□ 상수원 보호구역

상수도사업장	보 호 구 역			구역지정일	보호시설
	면적(㎢)	상류(Km)	하류(Km)		안내판	표주
계	27.657				42	132
방수리취수장	0.285	1.0	0.5	72. 5. 5.	7	24
상관수원지	26.655	전유역		24. 6. 9.	10	26
삼천취수장	0.284	2.2 (독배천0.7)	0.3	82. 6.19.	11	42
원당양수장	0.104	1.0	0.1	80. 8. 4.	6	16
전미취수장	0.329	0.5	0.3	67. 8. 5.	8	24

□ 상수원 수계별 『댐』 저수량

수 원	위 치	만수량(천㎥)	관리기관	비 고
계		817,139
상 관 제	완 주 군	2,139	전 주 시	대성수계보충
용 담 댐	진 안 군	815,000	수자원공사	전주권광역

하 수 도  기 본 현 황

□ 하수도

구 분		처리구역 (㎢)	계획연장 (㎞)	시설연장 (㎞)	미시설연장 (㎞)	보급율 (%)	비고
계		54.97	1,826	1,530	296	83.8
합 류 식			0	566	0	100.0
분류식	소 계	54.97	1,826	964	862	52.8
	오수관거	-	902	528	374	58.5
	우수관거	-	924	436	488	47.2

□ 차집관로

하 천 명	연 장 (㎞)	맨 홀 (개)	우수토실 (개소)	환기구 (개소)	여수토실 (개소)
계 (6개노선)	88.9	1,010	251	73	5
전주천 (좌, 우안)	23.5	369	142	37	4
삼 천 (좌, 우안)	15.4	155	45	18
금암천 (좌, 우안)	4.4	82	38	9
아 중 선	12.0	174	16	4
팔복선(공장,생활)	16.9	183	8	5	1
상 관 라 인	10.4	47	2
기 타	6.3

□ 하수․위생처리 시설

구 분	하 수 처 리	위 생 처 리
위 치	덕진구 송천동 2가 1035번지
시설용량	1일 처리능력 ⇨ 403,000㎥ - 1단계 시설 : 113,000㎥ - 2단계 시설 : 190,000㎥ - 3단계 시설 : 100,000㎥	1일 처리능력 ⇨ 290㎘ - 분 뇨 : 30㎘ - 정 화 조 : 260㎘
처리방법	1․2단계 고도처리(CNR)공법 3단계 고도처리(CSBR) 공법	하수 연계처리(1994년부터 시행)

2009년 상수도 공기업 예산

총 규 모 : 64,984백만원

〔단위 : 백만원〕

세 입			세 출
계 : 64,984(100%)			계 : 64,984(100%)
▣ 상수도사업수익 : 58,746(90.4%)			▣ 상수도사업비용 : 46,376(71.4%)
◦ 영업수익 : ․ 급 수 수 익 : ․ 급수공사수익 : ․ 기타영업수익 : ◦ 영업외수익 : ․ 예금수입이자 : ․ 타회계전입금 : ․ 기타영업외수익 :	53,694 50,650 2,583 461 5,052 1,550 3,278 224		◦ 인력운영비 : ◦ 운 영 경 비 : ◦ 경 상 이 전 : ◦ 급수 공사비 : ◦ 지급이자 :	6,256 34,056 2,416 1,303 2,345
▣ 자 본 적 수 익 : 706(1.0)			▣ 자본적지출: 18,608(28.6%)
◦ 자본잉여금수익 :	706		◦ 자본투자비 :	13,868
			◦ 부채상환금 :	4,009
▣ 예 산 외 계 정 : 5,532(8.5%) (과년도계정)			◦ 예 비 비 :	731

2009년 하수도 공기업 예산

총 규 모 : 30,634백만원

〔단위 : 백만원〕

세 입			세 출
계 : 30,634(100%)			계 : 30,634(100%)
▣ 하수도사업수익 : 16,519(53.9%)			▣ 하수도사업비용 :12,615(41.2%)
◦ 영 업 수 익 : 13,770			◦ 영 업 비 용 : 12,186
. 하수도사용료수익 : . 기타영업수익 :	13,599 171		. 인력운영비 등 : 1,665 . 운영경비 등 : 763 . 민간위탁대행사업비 : 9,758
◦ 영업외 수익 : 2,749
. 수 입 이 자 : . 타회계전입금수익 : . 기타영업외수익 :	236 2,098 415		◦ 영업외 비용 : 292
			◦ 특별손실 : 37
			◦ 예 비 비 : 100
▣ 자 본 적 수 익 : 13,873(45.3%)			▣ 자본적지출: 18,019(58.8%)
◦ 자본잉여금수익:	13,873		◦ 가동설비자산 :	16,056
․ 타회계건설보조금:	8,673
			◦ 비가동설비자산 :	322
․ 공 사 부 담 금 :	5,200		◦ 고정부채상환금 :	1,419
▣ 예 산 외 계 정 : 242(0.8%) (과년도계정)			◦ 예 비 비 :	222

부서별 주요업무 추진상황

수도행정과  소관

급 수 과  소관

수질관리과  소관

하 수 과  소관

수 도 행 정 과  소 관

ꊱ	상수도 계량기 수용가 정비	----	10
ꊲ	「건전재정 확충 실현을 위한」 상수도 체납사용료 징수율 제고	----	11

상수도 계량기 수용가 정비

○ 계량기가 설치되어 있으나 실제 검침하기 어려운  계량기에 대한

일제조사를 실시하여, 구조개선  및  화상검침시스템 설치 등

검침 환경을 개선함으로써 검침 및 요금 부과의 신뢰성 제고

□ 사업개요

○ 기    간 : 2009. 6월 ～ 11월(6개월간)

○ 대    상 : 61,482전(일반주택 수용가 전체)

○ 조 사 자 : 검침원 86명, 요금담당외 3명 등

○ 조사내용 : 상수도 계량기 검침이 어려운 수용가

- 도로, 창고, 거실, 지하에 깊이 설치된 곳 등

○ 예 산 액 : 45백만원(2009년 1회추경 확보)

□ 추진상황

○ 검침 어려운 수용가 일제조사에 따른 검침원 교육 : ‘09. 6. 8

○ 검침 어려운 수용가 일제조사 실시 : 1,095전

- 검침곤란(위치부적정) 250전   - 지하․맨홀 119전

- 개봉곤란(덮개무거움) 137전   - 수용가부재(장기간 공가) 589전

○ 검침 어려운 계량기실 구조개선 변경 안내     :  ’09. 8월 ～  9월

○ 옥외 화상 검침시스템 계약 및 설치        :  ’09. 9월 ～ 10월

※ 설치전수 : 250전(완산 120전, 덕진 130전)

□ 금후계획

○ 검침이 어려운 수용가에게 구조개선 변경 협조 당부

○ 체계적인 수용가 관리로 상수도 행정의 신뢰성 확보

「 안정재정 확충 실현을 위한 」

체납 상수도사용료 징수율 제고

□ 현   황

2009. 10. 23현재                                〔단위 : 천건 /백만원]

구분 년도	조 정 액		징 수 액		체 납 액		징수율 (%)	비고
	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액
계	1,985	42,212	1,812	39,116	173	3,096	92.7
현년도	1,800	38,922	1,730	37,403	70	1,519	96.1
과년도	185	3,290	82	1,713	103	1,577	52.1

□ 그간 추진상황  ---  과년도분 징수목표 2,170백만원(66.0%)

○ 지금까지 징수실적 : 82천건 / 1,713백만원(52.1%)

○ 특별징수기간 운영 : 5월, 9월～12월까지 지속적 징수 독려

○ 상수도요금 체납자 납부 독려

- 고액․고질 체납자 계고장 교부(20만원 이상) : 38,165명

- 검침원 활용 납부 안내문 교부(20만원 이하)  : 7,168명

○ 고액 및 고질 체납수용가 단수조치(다량 수용가) : 392개소

□ 문제점 및 대책

○ 집합건물 입주자와 생계형 영세상인 등 다수민원 발생

○ 경기침체로 인한 휴폐업, 실직자 증가, 부도 등으로 체납액 증가

⇨ 고액체납자, 영세상인 등 분납 유도 납부 징수

□ 금후계획

○ 체납자(20만원 이상)독려부 작성 호별방문 계고장 교부, 납부 독려

○ 고액, 고질체납자 유형별 분석, 단수 및 미개전 수용가 지속 독려

○ 상습 고액체납 수용가 징수반 편성 운영 : 2개반/ 7명

○ 징수불능 체납액 과감한 행정처리, 결손 등

- 경락자 미납대상자 결손처분  8,203건/ 171백만원 추진

- 체납자 전국재산조회 실시 : 607건

급 수 과  소 관

ꊱ	「상수도 전면개량을 통한」 맑은물 공급사업	----	13
ꊲ	상수도 100% 확대 공급사업	----	14
ꊳ	「전주권 광역상수도 1단계 3차 수수사업 관련」 전북혁신도시․팔복배수지 건설 사업	----	15
ꊴ	누수 탐사 및 긴급 누수 복구 공사	----	16
ꊵ	대형 계량기실 확장 및 배관 구조 개선	----	17

「상수도 전면개량을 통한」맑은물 공급사업

○ 유수율을 85% 이상으로 향상시켜 상수도 경영 합리화를 도모하고

선진화된 급수체계를 구축하여 시민들에게 맑고 깨끗한 수돗물을

공급하고자 함

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2009년 ～ 2014년

○ 총사업비 : 1,436억원(1차분 256억원)

○ 주요사업내용

- 블록고립 및 균등수압 안정화 128개 블록

- 노후블록에 대한 노후관 집중정비 50개 블록

- 통합관리 전산시스템 구축 1식

▶ 1차분 주요사업 : 블록고립 15개소, 블록정비 11개소, 통합센터 신축 1동

- 상수도관 매설 : L=123km(송․배수관 63, 급수관 60)

□ 추진상황

○ 공사착공  ----------------------------------    ‘09. 3월

○ 사업명칭 변경  -----------------------------    ‘09. 4월

○ 사업설명회 실시 : 8회 650명(공무원 및 시민 등) --  ‘09. 3 ～ 11월

○ 주민설명회 실시 : 10회(인후1동 외 9개동 통장회의) --- ‘09. 4 ～ 11월

※ 공사 추진상황 : 현공정 2.5%

- 교동 한옥마을 부근 외 20개소 상수도관 30㎞ 매설

□ 금후계획

○ 시민홍보(주민설명회 등) 지속 실시

○ 1차분(금차분) 준공  --------------------------  ‘10. 7월

○ 전체분 준공  ----------------------------------  ‘14. 3월

상수도 100% 확대 공급사업

○ 상수도 혜택을 받지 못하고, 지하수나 간이상수도를 사용하는

농촌 변방동에 맑고 깨끗한 수돗물을 공급하여 시민 모두에게

안정적인 상수도를 제공함으로써 시민보건 향상에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 사업기간 : 1999년 ～ 2010년(12개년)

○ 총사업비 : 18,515백만원

○ 사 업 량 : 배수관 포설 152㎞, 가압장 신설 11개소

○ 수혜가구 : 126개마을 /  4,213세대(약 16,475명)

□ 추진상황

○ 2009년 까지 실적(계획대비 95.6%)

- 사 업 비 : 16,608백만원(일반회계 6,870, 특별회계 9,738)

- 사 업 량 : 배수관 포설 145.3㎞, 가압장 신설 9개소

- 수혜가구 : 123개마을 /  4,110세대(약16,147명)

□ 금후계획

○ 2010년 추진계획

- 위    치 : 삼천3동 독배마을, 중노송1동 마당재 및 소규모 미급수 지역

- 사 업 비 : 1,907백만원

- 사 업 량 : 배수관 포설 6.7㎞, 가압장 신설 2개소

- 수혜가구 : 103세대 328명

※ 2010년까지 상수도 100% 공급사업 완료

「전주권 광역상수도 1단계 3차 수수사업 관련」

전북혁신도시․팔복배수지 건설사업

○ 기존 금강광역상수도 송수관에서 직접 공급되는 조촌, 팔복, 동산,

효자4, 송천2, 삼천3동 지역에 간접 배수방식으로 공급하고

○ 국가의 지역균형 발전 계획에 따른 혁신도시, 법조타운, 장동 유통단지

및 첨단산업단지 등의 생활용수를 안정적으로 공급하고자 함

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2009 ～ 2012(4개년)

○ 위    치 : 전주시 덕진구 팔복동․만성동 일원

○ 사업내용 : 팔복배수지 건설(용량 34,500㎥/일), 송․배수관 매설 16.3㎞

○ 총사업비 : 36,675백만원(국비 10,135 시비 23,217 주택공사 3,305)

- 확보예산 : 10,524백만원(국비 3,026 시비 7,498)

□ 추진상황

○ 실시설계 용역 완료(팔복배수지)  --------------  ‘04. 12. 21

○ 토지 및 지장물 보상 : 토지 29필지 29,661㎡(94%), 지장물 22건(100%)

○ 혁신도시 및 법조타운 개발계획에 따른 배수지 용량 검토로 발주 중지 --  ‘06. 8. 2

- 운휴중인 배수지(송천,금암,서신,중화산) 활용으로 급수구역 조정

○ 팔복배수지 재설계 협의(전주시 ⇒ 토지공사 전북본부) ---  ‘09. 3. 12 ～ 3. 16

○ 용역과제 심의 완료  ------------------------  ‘09. 6. 15

○ 혁신도시 배수관 포설공사 착수 ---------------  ‘09. 9. 3

○ 팔복배수지 실시설계용역 착수 ---------------  ‘09. 9. 11

□ 금후계획

[혁신도시 배수관 포설]

○ 공사 추진  -----------------------  ‘09. 9월 ～ ’12. 9월

[팔복배수지 건설]

○ 전문가 설계자문․설계심의 및 수도사업 인가  ----- ‘09. 12월

○ 공사 및 감리 발주 ----------------------------   ‘10. 1월

○ 공사 추진  ----------------------  ‘10. 1월 ～ ’12. 12월

누수 탐사 및 긴급누수 복구공사

○ 상수도관에서 발생하는 누수를 신속하고 효율적으로 긴급

복구하여 시민불편을 해소하고 누수지역의 탐사 복구를 통해

유수율을 향상시켜 상수도 경영 효율화를 도모하고자 함

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 급수구역 일원

- 상수도 전면개량을 통한 맑은물 공급사업 지역 제외

○ 사 업 량 : 누수복구공사 1,095개소 정도

○ 사 업 비 : 1,075백만원(본예산 1,050, 1회추경 25)

○ 사업기간 : 2009. 2 ～ 12월

□ 추진상황

○ 상ㆍ하반기 긴급 누수복구 공사 시행  ------  ‘09. 1 ～ 11월

- 850백만원 / 935개소 처리

○ 상ㆍ하반기 누수탐사․복구공사 시행  ------  ‘09. 1 ～ 11월

- 225백만원 / 160개소

○ 소규모 누수민원 2,430건 처리(자체처리)

- 계량기실 누수복구 및 밸브 교체등

□ 금후계획

○ 동절기 긴급누수 복구공사 추진 ---  ‘09. 12월 ～ ’10. 2월

- 100백만원(사고이월) / 100개소 정도

대형 계량기실 확장 및 배관구조 개선

○ 대형 주계량기실의 확장 및 구조 개선으로 계량기의 잦은 고장을

예방하고 민원 발생요인을 사전 예방하여 상수도 사용량의 정확한

검침과 적정요금을 부과하기 위함

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2007 ～ 2010년(4개년)

○ 사 업 비 : 600백만원

○ 대    상 : 136개소(확장 42, 배관 구조개선 94)

- 공동주택 계량기 80㎜ 이상 주계량기실 중 개선이 필요한 장소

○ 사업내용 : 계량기실 구조물 확장, 스트레나 등 교체 설치

□ 추진상황

○ 2009년까지 추진실적

- 사 업 비 : 575백만원

- 추진실적 : 62개소 완료(확장 42, 배관 구조개선 20)

※ 2009년도 19개소(확장 17, 배관 구조개선 2)

▷ 2007년도 시행분 효과 분석

- 대    상 : 23개소

- 비교방법 : 개선사업 시행 전ㆍ후 1년간 운영 비교

- 비교결과 : 유지관리 비용절감 약 13백만원/년,

계량기 고장 횟수 14건 감소

유수량 증가에 따른 세입증대 약 17백만원/년

□ 금후계획

○ 배관 구조개선 잔여 대상(74개소)은 맑은물 공급사업에 포함 시행

수 질 관 리 과  소 관

ꊱ	『변방동지역 지하수 수질검사 무료실시』 시민 건강을 위한 실질적 행정 서비스 제공	----	19
ꊲ	고객중심의 수돗물 품질관리 및 검증	----	20
ꊳ	『국가공인 수질검사기관』운영 강화	----	21
ꊴ	『고품격 수돗물 생산을 위한 정수시설 현대화』 대성정수장 정수약품 자동투입시설 구축	----	22
	『안정된 수돗물 생산을 위한』 상수도 취․정수시설 유지관리	----	23

『변방동지역 지하수 수질검사 무료실시』

시민 건강을 위한 실질적 행정 서비스 제공

○ 변방동 지하수 음용세대에 대하여 무료로 수질검사를 실시하여

주민의 건강증진 및 편익을 제공하고 불안감을 해소하는 대시민

행정서비스를 제공하고자 함

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2007년～2009년(3년간)

○ 대    상 : 변방동(10개동) 80개 마을 2,650세대중

‘09년도 추진대상 : 1,007세대

- 대상지역(10개동) : 동서학동, 평화2동, 팔복동, 우아2동, 호성동,

송천1.2동, 동산동, 조촌동, 삼천3동

○ 수질검사 개요

- 검사항목 : 일반세균외 16개 항목(음용 적합ㆍ부적합 검사)

- 수 수 료 : 면제(면제금액 : 76,000원/건)

※ 수수료 면제에 의한 경제적 부담 감소로 주민의 호응도가 높음

□ 추진상황

○ 2008년도 까지 추진실적 : 1,643세대 완료 (‘07년 759, ’08년 884세대)

○ 2009년도 추진실적 : 1,007세대중 748세대 완료

□ 금후계획

○ 잔여대상 259세대에 대하여 지속적으로 추진

○ 부적합 세대에 대한 지속적인 관리 및 수돗물 음용권장 등 대안제시

고객중심의 수돗물 품질관리 및 검증

○ 안심하고 마실 수 있는 수돗물 공급을 위해 지속적으로 노력     하고 있으나 일부시민들이 여전히 수돗물에 대한 불신 상존

○ 앞으로 고객과의 소통 및 수돗물 품질검증 등을 통한 신뢰성 제고

□ 사업개요

○ 상수원수부터 수도꼭지수까지 철저한 수질관리 및 검사

- 규정항목보다 강화한 수질검사(정수 57개 ⇒ 92개항목)

○ 수돗물 평가 소비자 모니터링제 실시

○ 수돗물 신뢰성 제고를 위한 품질인증제 및 품질보고서 발행 등

□ 추진상황

○ 대성정수장 정수약품 자동화시스템 투입설비 구축

- 과대․과소투입의 문제점을 해소, 맑고 안전한 수돗물 공급

○ 안심하고 음용토록『수돗물 신뢰도 제고정책』추진

- 매월 수질검사결과 등을 언론(6회) 및 인터넷을 통한 홍보

-『도내최초』수돗물 품질인증제 추진 : 1,377세대(‘09.1~10월)

- 수돗물의 공급과정 및 수질상태를 담은『수돗물 품질보고서』배부 : 20만부

- 수돗물 생산시설(대성정수장) 시민 견학 : 3,349명(‘09.1~10월)

○ 노후공동주택 수질검사 실시 : 72개소 287세대

○ 수질평가위원회 개최 및 민관합동 수질검사 실시

○ 소비자 모니터링제 확대추진 : 73명 ⇒ 200명(‘09. 9월)

□ 금후계획

○ 규정보다 강화한 수질검사 시행 및 품질 고급화를 위한 연구

○ 신뢰성 제고를 위한 수돗물 품질인증제 지속 실시(월 120세대)

○ 소비자 모니터링제 지속운영으로 수요자와의 소통을 통한 문제점 개선

『국가공인 수질검사기관』운영 강화

○ 국가공인 수질검사기관의 효율적인 운영을 위하여 검사기관의

신뢰성 제고와 지속적인 홍보로 세외수입을 올려 상수도 경영

행정을 도모하고 신속한 민원서비스 제공

□ 운영개요

○ 국립환경과학원『먹는물 수질검사기관 제33호』지정 - ‘00.7.25

○ 검사범위 : 먹는물(수돗물 등), 상수원수, 먹는샘물, 각종 지하수

○ 수수료수입 : ‘00년~‘08년 2,717백만원(연평균 3억원정도)

□ 추진상황

○ 부단한 연구와 노력으로 수질검사 분야 능력평가 최상위 도달

- ‘09년 4월 환경부 주관 공인 수질검사기관 정도관리(AQC)

평가 결과 최고점수(100점) 획득

○ 공인기관을 활용한 각종 수질관리 시책추진 및 시민불편 해소

- 도내 최초 수돗물 인증제 시행(년 1,400세대 이상)

- 변방동지역 지하수 음용세대 무료 수질검사(‘07부터 2,391세대 완료)

○ 시․군 방문 홍보 등 적극적 마케팅을 통한 수수료 수입증대

- ’09년 10월 현재 319백만원 수수료 수입

※ 일정 규모 이상 검사의뢰 시료의 시․군 방문 직접수거(2,879건)

○ 현대화된 실험실 최첨단 검사장비 확보

- 조류, 냄새 유발물질 분석기기 도입(‘09. 10월)

□ 금후계획

○ 적극적 수탁검사 유치활동으로 세외수입 증대 지속 추진

○ 자체분석기술연찬 및 교육 등을 통한 연구 및 검사능력 함양

『고품격 수돗물 생산을 위한 정수시설 현대화』

대성정수장 정수약품 자동투입시설 구축

○ 탁도 등을 제거하는 고분자 응집제 수동투입시설을 유입원수의

성상에 따른 자동화투입시설로 개선하여 과대ㆍ과소투입의

문제점을 해소, 맑고 안전한 수돗물 공급

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2009. 2. 1 ～ 2008. 6. 11(5개월)

○ 사업내용

- 정수장 중앙감시 운영관리 프로그램 통합설치

- 자동약품투입기 및 투입배관 설치 등

- 약품투입 감시 자동제어반 설치

○ 소요예산 : 141백만원

※ 각종용역 및 운영 효율화 사업계획 보고서에서 필요성 지적

- 상수도종합경영진단 및 운영 개선방안 용역 보고서(2006.04)

- 지방상수도 운영 효율화 사업계획서(2006.06.한국수자원공사)

□ 추진상황

○ 사업내역 설계완료 및 입찰공고  ---------------   ‘09. 2월

○ 입찰완료 공사계약 체결 ------------------------  ‘09. 4월

○ 자동약품투입기 및 배관시설 등 설치 -------------   ‘09. 4월

○ 자동제어시스템 완료 운영   -------------------   ‘09. 6월

※ 자동투입시설 구축운영 효과로 깨끗하고 안전한 수돗물 공급중

□ 금후 계획

○ 자동투입 프로그램의 지속적인 관찰․운영으로 효율 극대화

○ 유량 및 탁도의 변화에 따라 적정량이 자동투입 될 수 있도록

투입량 응집효율성(Jar-Test) 실험 병행 최적운영

『안정된 수돗물 생산을 위한』

상수도 취ㆍ정수시설 유지관리

○ 수돗물생산의 효율적인 운영을 위하여 시설물 개량 및 적기

보수로 안정적 공급을 추진하고 상수도 사업장의 시민공개에 따라

시민편익을 제공하는 상수도사업장으로 환경조성 추진

□ 사업개요

○ 상수도사업장 : 17개소(취수장 5, 정수장 4, 배수지 8)

○ 상수도 사업장 시설물의 개선 및 현대화 -- 21건 1,761백만원

○ 취․정․배수시설의 유지관리 및 보수 ---  40건   350백만원

□ 추진상황

○ 사업장 시설물 개선 : 대성정수장 배수지 개량 등 18건 1,645백만원

○ 소규모 유지관리 수선 : 팔복․대성정수장 수전설비 보수 등 37건 326백만원

○ 삼천취수장 시민쉼터 조성 및 지곡정수장 산책로 정비 추진

- 총사업비 : 98백만원(삼천 50, 지곡 48)

․ 목조펜션형 옥외 화장실, 음수대, 벤치, 고효율 LED가로등

설치 및 조경수 식재, 보도블럭 포장, 건물 도색 등

□ 금후계획

○ 팔복정수장 밸브류 및 시설물 보수 ------------  106백만원

○ 인후배수지 내부 도장공사 --------------------  200백만원

○ 유량계 교체(효자배수지, 대성정수장) --------- 100백만원

하  수  과   소 관

ꊱ	하수관거정비 민간투자(BTL)사업	----	25
ꊲ	화산․덕진 처리구역 하수관거 정비사업	----	26
ꊳ	하수처리 편입구역 하수관거사업	----	27
ꊴ	중앙처리구역 하수관거 정비사업	----	28
ꊵ	전주시 하수도정비기본계획 변경 용역	----	29
ꊶ	농촌마을 하수도 정비사업	----	30
	하수찌꺼기 처리시설 설치사업	----	31
	환경사업소 생물반응조 덮개설치 사업	----	32
	환경사업소 노후시설 대수선 사업	----	33

하수관거정비 민간투자(BTL)사업

○ 민간자본 유치로 지역경기를 활성화 하고 정화조 폐쇄로 시민부담 경감

○ 오수관거 정비로 하천 수질개선 및 불명수를 차단 하수처리비 절감

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 일원(덕진, 아중, 중앙, 화산, 효자처리구역)

○ 사 업 량 : 하수관거 정비(우․오수 분리) L=127Km, A=6.7㎢

○ 사 업 비 : 107,361백만원(민간자본)

○ 사업기간 : 2005 ～ 2010(6개년)

□ 추진상황(전체공정 98%)

○ 시설사업 기본계획고시(민투법 제8조) ---------  2005. 06

○ 업무 위․수탁 협약체결(환경부, 도, 시, 환경관리공단) --  2005. 06

○ 의무부담 행위 동의안 의견(시의회) -----------  2005. 09

○ 민간사업자 사업계획서 평가 및 우선협상대상자 선정  --  2005. 10

○ 협상 및 사업시행자 지정【전주아랫물길(주)】--  2006. 04

○ 사업실시계획 승인 및 주요공사 추진 ----------  2006. 04

- 전체 하수관거 127km 중 125㎞ 완료

- 가정배수설비 9,241세대 중 7,800세대 완료

□ 금후계획

○ 하수관거 L=2㎞, 배수설비 등 마무리 ---------  2010. 04

○ 성과보증(13개월) ------------------------------ 2011. 05

○ 사업시행자 관리운영(20년간) ------ 2011. 05 ～ 2031. 05

화산ㆍ덕진 처리구역 하수관거 정비사업

○ 하수관거 우․오수 분리를 통하여 민간위탁중인 하수처리비 절감

○ 전주천, 삼천 수질개선과 건물 정화조 폐쇄로 시민 보건위생 향상

□ 사업개요

○ 위    치 : 삼천․동서학․서서학․서신․인후․금암․호성․덕진동 일원

○ 사업규모 : 하수관거정비(우․오수 분리) L=72.0㎞

○ 사 업 비 : 40,695백만원(국비 20,347, 지방비 20,348)

※ 기투자 38,335백만원, 2009년 2,360백만원(국 1,154, 시 962, 기 금244)

○ 사업기간 : 2004 ～ 2009(6개년 장기계속공사)

□ 추진상황(전체공정 100%)

○ 2009년 관거사업(2,360백만원) 마무리  -------   2009. 06

- 거산황궁@, 흑석골 주변 L=3.8㎞ 하수관거 및 가정배수설비

- 호성동 호성굴다리 ～ 호성파출소간 가정배수설비

하수처리 편입구역 하수관거사업

○ 전주,삼천 상류지역의 생활오수를 차집 하수처리장에 유입

○ 공공수역 수질오염 방지로 쾌적한 하천 수변 공간제공

○ 농촌동 마을하수도 개량으로 시민 보건위생 증진

□ 사업개요

○ 위    치 : 평화동 장교마을등 48개마을

○ 사 업 량 : 하수관거 설치  L=76.4km

○ 사 업 비 : 42,632백만원(국비 21,316, 지방비 21,316)

※ 기투자 2,444백만원, 2009년 6,222백만원(국 4,080, 시 1,318, 기금 824)

○ 사업기간 : 2007 ~ 2011(5개년)

□ 추진상황(전체공정 20%)

○ 지방재정 투융자 심사완료(행정자치부) --------  2007. 10

○ 실시설계 용역 및 설계 보완 -------- 2007.06 ～ 2008. 05

- 행정절차이행(재원협의, 하수도사업인가 등) ---  2008. 08

○ 하수도 사업인가 -----------------------------  2008. 08

○ 공사착공(중복․전주천지구) ------------------  2008. 10

○ 공사착공(박물관지구, 평화지구, 중인지구) ----  2009. 03

- 전체 L=76.4km중 9.4㎞ 완료(‘09년도분 공사완료) --- 2009. 11.12

□ 금후계획

○ 4개지구 단계별 사업추진 ---------------- 2010 ～ 2011

- 중복․전주천지구, 박물관지구, 평화지구, 중인지구

중앙처리구역 하수관거 정비사업

○ 노송천 자연형하천 복원사업 상류 오염원 차단으로 시민에게     생명력있는 수변공간 제공

○ 하천수, 지하수, 우수등 불명수 감소로 하수처리비 절감

□ 사업개요

○ 위       치 : 완산구 중앙, 풍남, 노송동일원(노송천복원사업 상류지역)

○ 사  업  량 : 하수관거정비 L=27.6㎞

○ 사 업 비 : 30,000백만원(국비 15,000, 지방비 1,500)

※ 2009년 : 1,388백만원(국비 374, 시비 940, 기금 74)

○ 사업기간 : 2009 ~ 2012(4개년)

□ 추진상황

○ 지방재정투융자심사(전라북도) ----------------- 2008. 10

○ 중기지방재정계획 반영(지방재정법 제33조) ---- 2008. 12

○ 실시설계용역 착수 --------------------------  2009. 03

○ 실시설계용역 완료 --------------------------  2009. 08

○ 행정절차이행(재원협의,설계자문,일상감사등) 완료 - 2009. 10

□ 금후계획

○ 공사 발주 ------------------------------------ 2009. 11

○ 공사착공 및 완료  ------------------ 2009.12 ～ 2012.12

전주시 하수도정비기본계획 변경 용역

○ 전북혁신도시, 전주만성 도시개발 사업 확장에 따른 하수도정비     기본계획을 변경, 하수도사업에 대한 종합적이고 장기적인     계획 수립 마련

□ 용역개요

○ 위    치 : 전주시일원(만성동, 중동 일원)

○ 용 역 량 : 5.07㎢(혁신도시 3.7㎢, 전주만성 1.37㎢)

○ 용 역 비 : 365백만원

○ 용역기간 : 2009 ~ 2010

□ 추진상황

○ 전북혁신도시, 전주만성지구 도시개발사업 하수도정비기본계획

변경 요청(토지, 주택공사) -----------------------   2009. 03

○ 용역과제 심의 ------------------------------   2009. 06

○ 하수도정비기본계획용역 협약 ----------------   2009.08

○ 용역발주 및 업체선정 -------------------  2009. 09 ～ 10

□ 금후계획

○ 용역 착공 -----------------------------------  2009. 11

○ 용역 완료  ----------------------------------  2010. 06

○ 하수도정비기본계획변경 승인(전주지방환경청) ---  2010. 06

농촌마을 하수도 정비사업

○ 새만금 상류지역의 하천수질을 개선하여 성공적인 새만금사업

추진에 기여

○ 농촌마을의 하수도 시설개량 및 우․오수 분리사업으로 하수처리

효율을 극대화하여 주민 삶의 질 향상

□ 현    황

○ 수혜가구 : 3,156가구(9,185명)

○ 사업규모 : 24개지구(완료 12, 추진중 1, 금후계획 11)

○ 사 업 비 : 40,000백만원(국비 70%, 시비 30%)

○ 기    간 : 2005 ~ 2015(11개년)

※ 매암지구 등 12개 미시설지구 년차별 사업추진

□ 사업개요

○ 위    치 : 원동 매암지구(5개마을), 전미동 진기지구(4개마을)

○ 사 업 량 : 처리시설 Q=280㎥/일(매암 190, 진기 90), 하수관거 L=15.2㎞

○ 사 업 비 : 10,000백만원(국비 7,000, 지방비 3,000) ⇒ 국비 70%

※ 2009년 확보예산 : 845백만원(국비 592, 시비 253)

○ 사업기간 : 2009. 11 ~ 2011. 12

□ 추진상황

○ 매암지구용역 완료           -----------------   2009. 9

○ 매암지구 재원협의 및 인가신청  --------------   2009. 9

○ 인가 완료 및 공사발주          -------------   2009. 11

□ 금후계획

○ 공사착공 및 추진     -------------  2009.12 ~ 2011.12

※ 진기지구는 2010년 신규사업으로 추진

하수찌꺼기 처리시설 설치사업

○ 2012년부터 해양투기 금지정책에 따른 대책마련 필요

○ 하수찌꺼기의 안정적 처리로 자연환경 보전에 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 삼천동 안산․삼산마을

○ 사업규모 : 하수찌꺼기 처리시설 150톤/일

○ 사 업 비 : 24,000백만원(국비 12,000  지방비 12,000)

○ 사업기간 : 2009 ～ 2012(4개년)

□ 추진상황

○ 기본 및 실시설계 용역 착수      -------------  2003.8.26

○ 용역 중지(공정율 81%)          ----------------  2004.12.6

○ 종합 리싸이클링타운 입지선정(삼천동 안산․삼산마을)  -----   2008.9.30

○ 종합 리싸이클링타운 민간투자사업으로 추진  ----   2009. 3.23

□ 금후계획

○ 민간 투자사업 적격성 검토 용역   ------  2009. 11 ~ 2010. 1

○ 시설사업 기본계획 고시(공모)  ----------------  2010. 3

○ 부지매입                 ---------------   2010. 4 ~ 9

○ 협상대상자 지정          --------------------   2010. 7

○ 사업착공 및 준공          --------  2010.11 ~ 2012. 4

환경사업소 생물반응조 덮개설치 사업

○ 하수처리장에 적합한 악취방지 시설을 설치하여 인근 주민들의

악취민원을 해소

○ 하수처리장이 혐오시설이라는 인식에서 탈피 환경보전 체험

교육장으로 활용

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 송천동2가 환경사업소 내

○ 사업규모 : 생물반응조 덮개(1,2단계) 5,600㎡ 및 악취방지 1식

○ 사 업 비 : 3,587백만원(덮개 1,733 탈취기 752 배관 997 전기 105)

※ 현재까지 확보예산 : 3,511백만원

○ 사업기간 : 2008. 10 ~ 2010. 10(3개년)

□ 추진상황

○ 용역준공                   --------------   2009. 2. 23

○ 경관자문 완료              --------------   2009. 3. 16

○ 설계자문 완료              --------------   2009. 3. 31

○ 덮개시설 구매설치 착공(1,2차분)  --------   2009. 7.  1

○ 탈취기 구매설치 착공       --------------   2009. 9. 10

○ 배관공사 착공              --------------   2009. 10. 5

○ 전기공사 착공              --------------   2009. 11. 5

□ 금후계획

○ 덮개시설 구매설치 착공(3차분)  ----------   2010. 1. 10

○ 사업완료                   --------------   2010. 6. 30

환경사업소 노후시설 대수선 사업

○ 내구연한이 경과된 노후시설에 대하여 대수선공사 실시로 하수

처리시설의 효율 제고 및 안정적 방류수질 확보

○ 차집관로에 유입되는 불명수 방지를 위한 보수공사로 하수처리비용

증가요인 제거

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 송천동2가 환경사업소 내

○ 관련규정

- 시설별 내구연한을 참고 협약 당사자의 협의에 따라 전주시장이 집행

※ 전주하수종말처리시설 민간투자사업 협약서 제45조9항

○ 사업규모

- 하수처리장 차집관로보수 공사 : 하천횡단 등 차집관거 15개소

- 삼천 우수토실정비 공사 : 신일강변@앞 등 6개소

- 기계 및 전기등 노후설비 교체보수 공사

․ 대  상 : 슬러지 수집기 등 6개 설비

(수집기 5, 파쇄기 2, 디젤발전기 1, 전기판넬 13, 변압기 1, 밸브 2)

○ 사업비 : 1,453백만원(기계․전기 1,053 차집관로 200 삼천우수토실 200)

□ 추진상황

○ 차집관로 보수공사 완료      -------------  2009.  6. 24

○ 삼천 우수토실정비 완료      -------------  2009.  6. 24

○ 기계 및 전기설비 교체완료   -------------  2009. 10. 30