제268회 전주시의회 임시회

도  시  건  설  위  원  회

2010년도

주요업무계획

비전사업추진단

보  고  순  서

□	일 반 현 황		-------	1
□	부 서 별 주 요 기 능		-------	2
□	기 본 현 황		-------	3
□	주요업무 추진계획
	○	비 전 사 업 팀	-------	4
	○	전 략 사 업 팀	-------	10

일  반  현  황

□ 기   구 : 2팀 6담당

비 전 사 업 추 진 단

비전사업팀

(3담당)

전략사업팀

(3담당)

컨   벤   션

산업단지조성

35사단이전

신시가지조성

에코타운조성

혁신도시지원

□ 정‧현원

과 별		총 계	일 반 직						별정	기능
			4급	5급	6급	7급	8급	9급
계	정 원	24		3	6	11	2	2
	현 원	24	1	2	6	12	3	0
비전사업팀	정 원	12		2	3	5	1	1
	현 원	12	1	1	3	5	2	0
전략사업팀	정 원	12		1	3	6	1	1
	현 원	12		1	3	7	1	0

부서별 주요기능

팀 별		분 장 사 무
비전 사업	컨 벤 션	○ 전시․컨벤션센터 건립 ○ 종합경기장 주변 도시재생사업 추진 ○ 1종 육상경기장, 야구장 건립사업 ○ 국제행사 및 전시 유치 기획 ○ 도시개발 특별회계 관리 ○ 35사단 기금운용
	35사단이전	○ 부대이전 기부 및 양여재산 절차 추진 ○ 부대이전 및 부지개발사업 민간 협약 ○ 부대이전사업 용역․공사 ○ 206항공대 이전 협의
	에코타운조성	○ 부지개발 행정절차 이행 ○ 부지개발사업 용역․공사
전략 사업	산단조성	○ 일반․도시 첨단산업단지 지정 ○ 산업단지 조성사업 실시계획 승인에 관한 사항 ○ 친환경첨단 복합단지 조성 ○ 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립 ○ 법조타운 조성
	신시가지조성	○ 지장물토지보상 / 환지 청산금 교부․징수 ○ 체비지 분양 / 개발행위 지도감독 ○ 환지계획 및 확정 처분 ○ 환지예정지 분할․합병 및 관리
	혁신도시지원	○ 혁신도시 개발계획 및 지구단위계획 협의 ○ 유치기업 및 공공시설 지원 ○ 기반시설 지원계획 수립 및 시행 ○ 이전기관 지원대책 수립 및 시행 ○ 보상협의회 구성 및 운영

기  본  현  황

□ 양여재산 보유 현황

재 산 명	양 여 일	재산내역		양여조건
		토지	건물
종합경기장 야구경기장 테니스장	2005.12.19	11필지 (116,284㎡)	5동 (37,129㎡)	․1종 육상경기장 건립 ․야구장:6,000평 ,5,000석 건립 ․테니스장:4,000평,16면, 1,000석 건립

□ 산업단지 현황

단지명	준공년도	면적(천㎡)	업체수	비 고
전주 1산업단지	1969년	1,683	131
전주 2산업단지	1987년	687	20
도시첨단산업단지	2008년	109	55

□ 택지개발 현황

구 분	계		완 료		추 진 중
	개소수	면 적(㎡)	개소수	면 적(㎡)	개소수	면 적(㎡)
합 계	30	23,506,240	25	15,187,644	5	8,318,596
구획정리	12	6,819,077	12	6,819,077	-	-
택지개발	13	6,337,531	12	5,832,720	1	504,811
도시개발	5	10,349,632	1	2,535,847	4	7,813,785

비전사업팀 소관

ꊱ	종합경기장 주변 도시재생사업 추진	----	5
ꊲ	전주 종합경기장 부지 개발사업	----	6
ꊳ	전주 종합경기장 이전사업	----	7
ꊴ	35사단 이전사업 추진	----	8
ꊵ	가장 질 높은 친환경 주거문화, 에코타운 조성	----	9

종합경기장 주변 도시재생사업 추진

종합경기장 부지 개발과 함께 주변지역을 광역적으로 계획하여 체계적․효율적인 개발로 도심 공간 구조 개편, 구도심 활성화, 새만금 배후도시 기반구축

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진 종합경기장 주변지역 (덕진동, 금암1동)

○ 규    모 : 약 140만㎡(42만평) - 가련산공원 포함(미포함 107만㎡)

○ 사업기간 : 2009년 ~ 2019년

○ 사 업 비 : 12,052억원 정도〈‘10년도 예산액 : 6억원(용역비)〉

○ 사업방식 : 특별법에 의한 도시재정비촉진사업

○ 시행방식 : 개별법(도시 및 주거환경정비법, 도시개발법 등)

□ 그간 추진상황

○ 도시재생사업 기본 구상 계획 간담회 개최(2회) - ‘09.02․04월

○ 도시재생추진단 자문회의 등 설명회 개최(3회) -- ‘09.03~05월

○ 대한토지주택공사 사업 참여(총괄사업관리자) 접촉(2회) -- ‘09.03․06월

○ 종합경기장 주변 재정비촉진사업 지구지정을 위한 용역 착수 -- ‘09.07월

○ 대한토지주택공사와 총괄사업관리자 참여 MOU체결 ---- ‘09.07월

○ 대한토지주택공사와 실무협의회 구성 및 운영 ------- ‘09.09월

○ 용역 중간 보고회(2회) ----------------------- ‘09.09․10월

○ 주민․이해관계인 대상 사업설명회(6회) 개최 -- ‘09.08~12월

□ 금후계획

○ 재정비촉진지구 지정 추진 ------------  ‘10.01월 ~ ’10.03월

- ‘10.01월 : 촉진지구 지정(안) 작성 및 주민공람

- ‘10.01월 : 용역 최종 보고회(납품 : ’10.02월)

- ‘10.02월 : 촉진지구 지정(안) 지방의회 의견청취

- ‘10.02월~03월 : 지구지정 신청 및 결정고시

○ 재정비촉진계획 결정 추진 ------------  ‘10.04월 ~ ’11.12월

- ‘10. 4월 : 재정비촉진계획수립 용역 발주(2010예산 확보 : 6억원)

- ‘10. 6월 : 총괄계획가 및 총괄사업관리자 선정

- 주민공청회, 지방의회 의견 청취, 촉진계획 결정 및 신청, 결정고시 : ‘11년

○ 사업착수 및 준공 -------------------  ‘12.01월 ～ ’19.12월

전주 종합경기장 부지 개발사업

○ 전시․컨벤션센터와 호텔 유치를 통한 회의․관광산업 인프라 구축

○ 새만금 개발에 따른 국제회의 및 관광 배후도시로서의 입지 강화

○ 종합경기장 부지 개발로 주변 도심 공간 구조 개편 유도 구도심 활성화

□ 사업개요

○ 부지현황 : 현 덕진 종합경기장 123,278㎡(37,291평)

※ 2005년 전북도로부터 조건부 양여 → 1종육상경기장, 야구장 대체시설 건립

○ 토지 이용계획(안)

┌ 기본시설 : 38,000㎡ (전시․컨벤션센터 30,000㎡, 호텔 8,000㎡)

└ 제안시설 : 85,273㎡ ⇨ 실현 가능한 민간사업계획 선정

○ 목표년도 : 2015년(사업비 1,780억원 민자)

○ 추진방식 : 민관합동형 PF방식(기부 대 양여)

□ 그간 추진상황

○ 도시기본계획변경(주거용지→상업용지) ---------- 2007. 05월

○ 여론 수렴 공청회 2회 -------------------- 2007.06월~09월

○ 공유재산 교환(테니스장↔여성교육문화센터) ----- 2008. 08월

○ 종합경기장 주변 도시재생사업과 연계 추진 발표 - 2009. 02월

○ 종합경기장 개발 타당성조사 용역(지구지정 용역에 포함) 착수 - 2009. 07월

○ 대한토지주택공사와 총괄사업관리자 참여 MOU체결 - 2009. 07월

□ 금후계획

○ 부지개발 사업계획(안)작성 및 의회 승인 -- ‘10.01월 ～ 03월

○ 투자유치 설명회 개최 및 민간사업자 공모 공고 -- ‘10.01월 ～ 06월

- 서울 등 대도시에서 민간자본 투자유치 설명회 추진

○ 민간사업자 제안사업 심사 및 계약 협상 --- ‘10.07월 ～ 09월

○ 재정투․융자심사 행정자치부 의뢰심사 신청 -- ‘10.10월 ～ 12월

○ 사업 착수 및 준공 -------------------- ‘12.01월 ～’15.12월

전주 종합경기장 이전사업

○ 종합경기장 부지개발에 따른 대체시설 건립 (현 체육시설의 노후화)

○ 월드컵경기장 주변 스포츠시설 집적화, 국제 규격의 스포츠시설 건립

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 장동 월드컵경기장 주변

○ 면    적 : 218,127㎡(65,983평)

○ 사 업 비 : 1,480억원 정도(공사비 1,070억원, 토지비 410억원)

○ 시 설 명 : 1종 육상경기장, 야구장

○ 목표년도 : 2014. 12월(2015년 전국체전 유치 대비)

□ 그간 추진상황

○ 1종육상경기장 투․융자심사 외 4종 절차이행 -- ‘08.06~10월

○ 육상경기장외 잔여체육시설 기본계획 및 타당성조사 용역 착수 - ‘08. 09월

○ 용역 중간보고, 시의회 간담회, 체육단체 및 전문가 의견수렴 - ‘09.02~05월

○ 잔여 체육시설 용역 성과 납품(완료) -------------- ‘09. 07월

※ 2008년 1종육상경기장 실시계획 인가 후 부지매입

- 총 49필지 103,505㎡중 16필지 34,386㎡ 4,040백만원(면적대비 33%)

(2008년 : 15필지 30,538㎡ 3,589백만원 / 2009년 : 1필지 3,848㎡ 451백만원)

- 잔여 토지 : 33필지 69,119㎡ 17,300백만원 정도

□ 금후계획

○ 투․융자 심사 등 행정절차 이행(민간사업자 선정 후) - ‘10.01～’12.02월

- ‘10.01~06월 : 1종육상경기장․야구장 기본계획 수립 및

타당성 조사 검토, 재정투․융자 의뢰심사 준비

- ‘10.07~09월 : 종합경기장 내부개발사업 우선협상대상자와 사업비 협상

- ‘10.10~12월 : 재정투․융자심사 행자부 의뢰심사 신청

○ 공사 착공 및 준공 ----------------------- ‘12.03～’14.12월

35사단 이전사업 추진

북부권 개발을 통한 지역 발전 도모 및 광역도시 기반 구축을    위한 군부대 이전사업의 조기 정상화 추진

□ 사업개요

○ 위    치 : 임실군 임실읍 대곡리․정월리․감성리 일원

○ 사업규모 : 7.3㎢(222만평), 건물 229동(연면적 40,274평)

○ 사업기간 : 2006.03. ～ 2011.03 (5년간)

○ 총사업비(민자) : 3,371억원 (현 공정 13.5%)

○ 사업시행 방식 : 기부 대 양여

□ 그간 추진상황

○ 35사단 이전 합의각서 체결  ---------------------  ’05. 11월

○ 실시계획 승인고시         ----------------------  ’07. 04월

○ 미매입 토지/지장물 수용 완료 및 공사 본격 착수 -  ’09. 04월

○ 실시계획 승인 집행정지(6/22), 무효확인 1심 소송 패소 -  ’09. 10월

○ 무효확인 소송 항소(서울고등법원)  --------------  ’09. 10월

□ 문제점 및 대책

○ 국방․군사시설사업의 실시계획 승인 무효확인 소송으로 사업중단에 따른 공기 차질 불가피 (피고 : 국방부, 원고 : 대곡리 주민 42인)

⇨ 국방부와 공동으로 대형 로펌 선임 항소심 승소 노력 : 김&장

⇨ 소송과는 별도로 실시계획 승인 재 처분절차를 이행하여 조속한 시일 내에 사업정상화 추진

○ 편입지역 주민들의 지속적인 사업반대

⇨ 사업 추진의 불가피성, 주민지원방안 수립, 이주단지조성, 소송으로 인한 피해 등을 설득하여 사업추진

□ 금후계획

○ 환경영향평가 협의(임실군, 전북도, 국방부, 환경부) - ‘09.12~’10.3월초

- 의제처리 사항 사전 협의 병행 처리

○ 기본설계 승인(국방부) -------------------------- ‘10.03월중

○ 실시계획 승인(국방부) -------------------------- ‘10.04월초

○ 공사 재착공    --------------------------------- ‘10.05월~

가장 질 높은 친환경 주거문화, 에코타운 조성

지역균형발전 및 광역도시 기반구축을 위하여 군부대를 이전하고 북부권 개발을 선도할 친환경 저탄소 에코타운으로 조성, 새만금 배후도시 기반 구축

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 호성․송천․전미동 일원

○ 면    적 : 2.004㎢(35사단 1.16, 항공대 0.32, 사유지 0.524)

○ 사 업 비 : 3,431억원(부지개발 1,712 항공대 496 기타 1,223)

○ 사업기간 : 2006.03 ~ 2014.12월(8개년)

○ 민간사업자 : (주) 에코시티

□ 그간 추진상황

○ 전라선 복선 전철화사업관련 도시관리계획 변경완료 -- 2008.10월

○ 구역지정 및 개발계획(안) 작성을 위한 기초조사 -- 2009.03월

○ 개발계획(안) 전문가 자문 및 시민단체 의견 수렴  -- 2009.05~08월

○ 개발행위허가 제한지역 지정을 위한 주민공람(의견청취) -- 2009.11.26~12.15

○ 개발행위허가 제한지역 지정을 위한 지방도시계획위원회 심의 --- 2009.12.29

※ 원안의결

□ 금후계획(예정)

○ 개발행위허가 제한지역 지정 고시 --------------- 2010.01월

○ 주민공람 및 공청회, 시 도시계획위원회 심의 ----- 2010.05월

○ 도시개발구역지정 및 개발계획 승인고시 --------- 2010.10월

○ 각종 영향평가 및 실시계획인가고시 ------------- 2011.08월

○ 공 사  시 행 ---------------------- 2012.01 ~ 2014.12월

전략사업팀 소관

ꊱ	친환경 첨단 복합단지 조성사업	----	11
ꊲ	만성지구 도시개발사업	----	12
ꊳ	효자5지구 택지개발사업	----	13
ꊴ	효천지구 도시개발사업	----	14
ꊵ	노후산단 및 주변 공업지역 재생사업	----	15
ꊶ	서부신시가지 체비지 매각 및 유지관리	----	16
ꊷ	전북 혁신도시 개발사업	----	17

친환경 첨단 복합단지 조성사업

○ 산업 용지를 적기에 개발, 공급함으로써 일자리 창출

○ 수도권 이전 기업 등을 적극 유치하여 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 팔복동 등 북부권 일대

○ 사업규모 : 522천㎡   (1단계 : 290, 2단계 : 232)

○ 총사업비 : 1,561억원 (1단계 : 935, 2단계 : 626)

○ 사업기간 : 2007～2012 (1단계 : 2010, 2단계 : 2012)

○ 시 행 자 : 한국토지주택공사

□ 그간 추진상황

○ 개발사업 협약 체결(전주시 ⇔ 주택공사)  -----  ‘07. 06. 21

○ 산업단지 지정 승인 및 고시  -----------------  ‘08. 01. 31

○ 실시계획 고시  ------------------------------  ‘08. 09. 23

○ 공사 착공(현 공정 45%)  -------------------   ‘08. 09. 30

○ 문화재 시굴 조사  ----------------------  ‘09. 03~‘09. 05

○ 미협의 토지 수용재결 결정(49필지 42천㎡)  --  ‘09. 07. 20

○ 문화재 발굴 조사  ----------------------  ‘09. 05~‘09. 12

○ 2단계 산업단지 계획수립 용역 착수  ----------  ‘09. 09. 04

○ 1단계 산업시설용지 공급가격 확정(100만원/3.3㎡) -- ‘09. 09. 21

○ 산업단지 관리기본계획 고시  -----------------  ‘09. 11. 24

□ 금후계획

(1단계)

○ 분양계획 수립 및 MOU 체결업체 분양  --   ‘10. 01~‘10. 03

○ 공 사 완 공  ------------------------------------  ‘10. 12

(2단계)

○ 산업단지 지정승인 등 행정절차 이행  -------------  ‘10. 12

○ 산업단지 개발계획 수립 등 사업시행  ----- ‘11. 01～’12. 12

만성지구 도시개발사업

○ 전주 북부권 개발의 계획적인 정비와 합리적 토지이용으로       지역 균형발전 도모

○ 혁신도시 연계 개발로 시너지 효과 기대 북부권 활성화 도모

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 만성동 일원

○ 면    적 : 1,453천㎡

○ 사 업 비 : 5,500억원

○ 수용인구 : 17,331인(5,777세대)

○ 사업기간 : 2008.12 ～ 2015.12

○ 사업시행자 : 한국토지주택공사

□ 그간 추진상황

○ 개발사업자 위탁 협약체결(전주시⇔주공) -------- ‘07. 06. 21

○ 도시개발구역 지정 승인(국해부) ---------------- ‘08. 11. 28

○ 구역 지정 및 개발계획 수립 고시(전주시) ------- ‘08. 12. 12

○ 개발계획변경 및 실시계획인가 신청 ------------- ‘09. 07. 10

○ 구역(변경) 지정, 개발계획 변경, 실시계획인가  -- ‘09. 12. 10

○ 법원․검찰청 용지 선수공급 계약체결 ----------- ‘09. 12. 24

□ 금후계획

○ 실시설계 용역시행 --------------------- ‘09. 10 ～ ‘11. 02

○ 보상 착수 ------------------------------------ ’11년 상반기

○ 문화재 시․발굴조사 -------------------------- ’11년 상반기

○ 공사 착수 ------------------------------------ ’11년 하반기

○ 1단계 준공(예정) --------------------------------- ’13. 12

○ 전체 사업 준공(예정) ----------------------------- ’15. 12

효자 5지구 택지개발사업

○ 택지의 효율적인 개발과 쾌적한 친환경 주거단지 조성

○ 서부신시가지와 연계 개발로 서부지역의 도시 활성화 도모

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 완산구 효자동 2, 3가 일원

○ 사업규모 : 504,811㎡

○ 사 업 비 : 1,754억원

○ 사업기간 : 2004. 09 ～ 2010. 12

○ 수용인구 : 8,142인(2,714세대)

○ 사업시행자 : 한국토지주택공사

□ 그간 추진상황

○ 택지개발 예정지구 지정(국해부) --------------  ‘02. 12. 31

○ 개발계획 승인(전북도)  ----------------------  ‘04. 09. 21

○ 환경․교통․재해영향평가 완료  --------------  ‘05. 10. 21

○ 실시계획 승인(전북도)  ----------------------  ‘06. 04. 27

○ 대지 조성공사 착공 --------------------------  ‘07. 05. 30

※ 공정(2009. 12. 31 현재) : 98%

□ 금후계획

○ 대지 조성공사 완료 ------------------------------  ‘10. 03

○ 전체사업 준공 -----------------------------------  ‘10. 12

효천지구 도시개발사업

○ 토지이용의 합리화 및 도시의 균형 발전

○ 택지의 효율적인 공급으로 쾌적한 주거환경 조성

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 효자동 2가, 삼천동 2가 일원

○ 사업규모 : 672,373㎡

○ 사 업 비 : 2,178억원

○ 계획기간 : 2005.12 ～ 2013.12

○ 수용인구 : 12,273인(4,091세대)

○ 사업시행자 : 한국토지주택공사

□ 그간 추진상황

○ 한국토지공사로 사업시행자 결정  -----------------  ‘04. 10.

○ 중앙도시계획위원회 심의  --------------------  ‘05. 12. 16

○ 도시개발 구역 및 사업시행자 지정(국해부)  ---  ‘05. 12. 27

○ 조사설계(개발계획수립)용역 착수  ------------  ‘06. 07. 05

○ 개발계획 승인(국해부)  ----------------------  ‘07. 12. 26

※ 실시계획 인가 법적시한 : ‘10.12.26일까지(경과시 자동취소)

□ 금후계획

○ 교통영향분석 및 개선대책 심의 -------------------  ‘10. 09

○ 개발계획변경 및 실시계획 승인(국해부)  ----------  ‘10. 12

○ 보 상 착 수  ------------------------------------  ‘11. 03

○ 공 사 착 공  ------------------------------------  ‘11. 10

○ 준 공 예 정  ------------------------------------  ‘13. 12

노후산단 및 주변공업지역 재생사업

노후산단 및 주변 공업지역의 입지 특성을 종합적으로 고려하여 최적의 토지의 이용계획, 공원녹지계획, 생활편익시설계획 등을 수립 전략산업유치, 지원기능 활성화를 통한 혁신클러스터로 육성

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 팔복동 공업지역

○ 정비대상 면적 : 5,400천㎡(전용공업 1,444, 일반공업 3,408, 준공업 548)

○ 사 업 비 : 12억원(개발계획수립 용역비)

○ 용역기간 : 2010. 01 ~ 2010. 12

□ 그간 추진상황

○ 전주 제1산업단지 재정비계획 타당성조사 연구용역 - ‘09. 02~12

○ 노후 산업단지 재생사업 개발계획수립 지원 신청 ----- ‘09. 04

○ 노후산업단지 및 공업지역 국토부 평가위원 현지실사 -- ‘09. 08

○ 우선사업지구 지원대상 선정 ------------------------ ‘09. 09

- 전주1산단, 대전1,2산단, 대구도심공단, 부산사상공단

○ 개발계획수립비 국고보조금(6억) 확정 통보----------- ‘09. 10

- 2009. 제2회 추경예산 12억원 확보(국비 6,  시비 6)

○ 용역과제심의 절차이행 ----------------------------- ‘09. 11

○ 노후산단 재생사업 개발계획수립 용역발주 ----------- ‘09. 12

□ 금후계획

○ 용역업체 선정(입찰) 및 재생사업 용역 착수 -------  ‘10. 01

○ 노후산단 재생지구 지정 및 개발계획 수립 ------ ‘10. 02～12

○ 재생사업 실시설계 ---------------------------- ‘11. 01～12

○ 노후산단 재생사업 공사 시행 ------------------ ‘12. 01～

서부신시가지 체비지 매각 및 유지관리

○ 잔여 체비지 매각을 통한 재원확보로 각종 부담금 등 체납 일소

○ 서부신시가지 시설보완 및 신속한 민원처리로 행정서비스 향상

□ 현    황

○ 미징수금 총액 : 1,334억원(미매각 718, 미도래 414, 체납 195, 청산금 7)

○ 미지급금 총액 :  971억원(공사비 220, 부담금 471, 지방채 242, 청산금 38)

※ 현재까지 실적 : 총 713필지/5,039억원 중 647필지/4,321억원 (85.7%)

※ 미매각 체비지 : 66필지/718억원(일반 41/527억원, 공공 25/191억원)

- 일반용지 : 41필지/527억원(일반업무 7/372, 의료 3/121, 주택 31/34)

- 공공용지 : 25필지/191억원(주 차 장 19/86, 학교 2/86, 공공업무 4/19)

□ 그간 추진상황

○ 2009년 체비지 매각실적 : 100필지 630억원

○ 유지관리공사 시행 :  5건 4억원(방음벽, 주차장, 유수지, 하수도)

□ 문제점 및 대책

○ 경기침체에 따른 체비지 매각 부진으로 공사비 등 미지급금 지급 지연

⇒ 공공용지(25필지) 매입 대상 부서에 예산확보 요청 및 매수 독려

⇒ 움직이는 광고 등 다양한 홍보활동으로 체비지 매각 총력 경주

□ 금후계획

○ 적극적인 체비지 매각 홍보 (생활정보지, 홈페이지, 버스, 현수막 등)

○ 시설물 유지관리 (민원 중심으로 시설물 보완)

○ 체비지 매각 상황에 따라 잔여사업 추진 검토 (미관광장, DB구축 등)

※ 2010년 추경시 소요예산 61억원(광장 45억, DB구축 16억) 확보 계획

전북 혁신도시 개발사업

○ 공공기관 지방이전을 통한 지방재정 확충 및 고용기회 확대

○ 지역전략산업과 연계하여 지역발전의 성장거점으로 육성

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 만성동․중동․장동․상림동, 완주군 이서면 일원

○ 규    모 : 10,145천㎡(전주 3,684  완주 6,461), 계획인구 29,018명

○ 사 업 비 : 15,423억원(사업기간 : 2007 ~ 2012)

○ 사업시행자 : 한국토지주택공사(68%), 전북개발공사(32%)

□ 그간 추진상황

○ 부지조성공사

- 한국토지주택공사 : 1공구 28%, 2공구  5.3%

- 전 북 개 발 공 사 : 1공구 25.8%, 2공구 20%

○ 문화재조사

- 도시시설부지 89%, 농업생명클러스터부지 64%

○ 혁신도시 종합상황실 개소 --------------------- ‘09. 09. 03

○ 혁신도시 전망대 준공 ------------------------- ‘09. 10. 09

○ 이전기관 지방이전계획 승인완료 --------------- ‘09. 10. 26

○ 대한지적공사 이전부지 매입계약 --------------- ‘09. 12. 28

□ 금후계획

○ 개발 및 실시계획 변경승인신청 -------------------  ‘10. 02

○ 특수구조물(교량)공사 발주 -----------------------  ‘10. 03

○ 이주자 택지 및 생활대책용지 공급 ----------------  ‘10. 04

○ 하수처리장 시설공사 발주  -----------------------  ‘10. 08

○ 공사준공 및 공공기관 이전 완료 ------------------  2012년