제275회 제2차 정례회

복지환경위원회

- 2011년도 세입‧세출 예산(안) -

주요사업설명서

맑은물사업소

상수도 공기업 특별회계

Ⅱ 주요 세부사업 설명서

	【급수과 소관】
	ꊱ 상수도 전면개량을 통한 맑은 물 공급사업	---	14
	팔복배수지 및 혁신도시 상수도 사업	---	15
	소규모 배수관 시설 사업	---	16
	ꊴ 고지대 급수난 해소 사업(지곡배수지 건설)	---	17
	ꊵ 노후(불용)관 정비 및 구관막기 공사	---	18
	ꊶ 긴급누수 복구 및 누수탐사	---	19
	【수질관리과 소관】
	ꊷ 공업용수 도수관 PE 갱생공사	---	20
	ꊸ 상수도 시설물 정밀점검 용역	---	21
	ꊹ 배수지 내부 개량공사(천마배수지)	---	22
	전미취수장 유공관 준설공사	---	23
	대성정수장 약품투입실 CCTV설치	---	24
	대성정수장 응집기 노후 수차 교체	---	25

ꊱ 상수도 전면개량을 통한 맑은물 공급사업(126쪽)

(급수과, 이성철, 220-7825)

1. 사업목적 및 필요성

○ 유수율 향상으로 상수도 경영의 합리화 도모

○ 선진화된 급수체계 구축으로 맑고 깨끗한 수돗물 공급

2. 사업추진근거

○ 전주시 상수도 경영혁신 방안 및 유수율 제고 종합계획 수립

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 전주시 급수구역 일원

○ 사업규모 : 블록고립 128개소, 블록정비 50개소, 통합관리시스템 구축 1식

○ 총사업비 : 1,436억원(융자금 400, 일반회계 400, 특별회계 636)

○ 사업기간 : 2009. 3월 ∼ 2014. 3월

4. 사전 행정절차 이행

○ 용역과제 심사 이행 완료

○ 중앙 투․융자심의 이행 완료

5. 그간 추진사항

○ 공 사 착 공 -------------------------------------------------  2009.  3.

○ 1차분 준공 -------------------------------------------------  2010.  7.

○ 2차분 착공 -------------------------------------------------  2010.  4.

○ 사업설명회 실시(21회) ------------------------------------ 2009. 3.~ 현재

※ 공사 추진상황 : 전체공정 23.0% (2차분 공정 72%)

- 상수도관 매설 45개지역 159.0㎞ 매설완료

- 통합관리센터 신축, 배수지(4개소) 개량사업 추진중

6.’11년 예산소요

○ 사 업 량 : 블록고립 2개소 및 블록정비 4개소 중 일부

○ 소요예산 : 2,717백만원 (시비)

○ 사    유 : 상수도 전면개량을 통한 맑은물 공급사업 예산 확보(계속비 사업)

7. 연도별 투자계획                                          (단위 : 백만원)

재원별		총사업비	기투자액			’11년	’12년∼
			계	’09년 이전	’10년
계		143,653	49,727	33,682	16,045	12,717	81,209
국 비
도 비
시비	일반회계	40,000	5,000	5,000			35,000
	특별회계	63,653	20,628	14,583	6,045	2,717	40,308
기타(융자금)		40,000	24,099	14,099	10,000	10,000	5,901

ꊲ 팔복배수지 및 혁신도시 상수도 사업(127쪽)

(급수과, 김성엽, 220-7832)

1. 사업목적 및 필요성

○ 전북혁신도시 및 만성동 복합단지에 입주하는 기관과 팔복동, 만성동 지역 주민들에게

안정적인 생활용수를 공급

2. 사업추진근거

○ 금강계통의 급수체계 조정에 따른 전주권 광역상수도 용수공급을 위하여 팔복배수지 신설 추진

○ 공공기관 이전에 따른 혁신도시 건설 및 지원에 관한 특별법에 의한 기반시설 상수도 지원

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 만성동 산48번지일원(황방산일대)

○ 사업규모 : 팔복배수지 건설(부지 31,476㎡ / 시설용량 34,500㎥)

송․배수관 16.3㎞(송수관 7.3㎞, 배수관 9.0㎞)

○ 총사업비 : 263억원

○ 사업기간 : 2009년  ∼  2012년

4. 사전 행정절차 이행

○ 중기지방재정계획 반영

○ 용역과제 심사 이행

5. 그간 추진사항

○ 실시설계 용역 완료 (생활용 배수지) ---------------------------- ‘04. 12. 21

○ 혁신도시 및 법조타운 개발계획에 따른 배수지용량 검토 사업 중지 ----- ‘06.  8.  2

○ 관련기관 회의에서 협의사항에 대한 팔복배수지 재설계 협의(전주시⇔토지공사 전북본부) ---- ‘́09.  3.

○ 팔복배수지 및 혁신도시 설계용역 완료 --------------------------- ‘10.  1.

○ 팔복배수지 및 혁신도시 사업 착수  -----------------------------  ‘10.  6.

6.’11년 예산소요

○ 사 업 량 : 배수지건설 (V=34,500㎥/일)

○ 소요예산 : 510 백만원 (시비)

○ 사    유 : 혁신도시 완공이전 상수도 시설을 완료하여 이전기업들의 원활한 용수공급 추진

7. 연도별 투자계획                                          (단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘11년	‘12년∼	비 고
계		26,305	16,125	3,802	6,378
국비	국고보조	9,315	6,026	3,289
	균특회계
	특 교 세
도 비
시 비		14,715	10,099	513	4,103
기 타		2,275			2,275	LH부담금

ꊳ 소규모 배수관 포설 사업(127쪽)

(급수과, 이동헌, 220-7821)

1. 사업목적 및 필요성

○ 상수도 공급혜택을 받지 못하고 지하수나 간이상수도를 음용수로 사용하고 있는 전주시내

일부 독립가옥 등에 상수도를 공급하여 시민보건위생 개선

2. 사업근거 및 추진경위

○ 민선4기 공약사업의 일환으로 도･농간 지역균형발전과 주민들의 보건위생향상을

위하여 시행한 상수도 100%공급사업 완료후 독립가옥 및 소규모 미급수지역에

대한 배수관 포설사업 시행

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 전주시 관내

○ 사업규모 : 관로매설 D=16∼100mm, L=2.5km

○ 총사업비 : 200백만원

○ 사업기간 : 2011. 3월 ∼ 2011. 11월

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 용역과제 심사 이행( 무 )

5. 그간 추진사항

○ 2010년 추진사항

- 사 업 량 : 배수관 포설 6.3㎞, 가압장 신설 1개소

- 사 업 비 : 646백만원

6. ‘11년 예산소요

○ 사 업 량 :배수관포설 (D=16∼100mm)  L = 2.5Km

○ 소요예산 :200백만원

○ 사    유 :소규모 독립가옥에 대한 배수관 포설공사 실시

7. 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘11년	‘12년∼	비 고
계		200		200
국비	국고보조
	균특회계
	특 교 세
도 비
시 비		200		200

ꊴ 고지대 급수난 해소 사업(지곡배수지 건설)(127쪽)

(급수과, 홍성진, 220-7822)

1. 사업목적 및 필요성

○ 대성정수장 취수원인 임실오원천 주기적 물분쟁등 대성정수장 불안정 및 취수중단시

평화동, 서서학동 고지대, 아파트등 다량수용가 급수불출 해소하고

○ 배수지 건설로 지곡수계 고지대등 안정적 용수공급 및 교도소 이전지역 상수도 공급대비

2. 사업추진근거 및 추진경위

○ 수도정비기본계획 1단계 사업에 지곡배수지 건설사업 반영

○ 대성정수장 취수원 감소ㆍ중단에 대비 고지대 급수불출지역해소

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 전주시 완산구 평화동 2가 산104-4번지 일원

○ 사업규모 : 배수지건설 V=15,000㎥, 가압장 신설 Q=30,000㎥/일

○ 총사업비 : 135억원(공사 120, 설계 5.5, 감리 및 기타 9.5)

○ 사업기간 : 2011년 ∼ 2013년

4. 사전 행정절차 이행

○ 중기지방재정계획 반영

○ 용역과제 심사 이행

5. 그간 추진사항

○ 지곡정수장 송수관로 매설 및 PE갱생추진----------------------- ‘05. ∼ ‘06.

6.’11년 예산소요

○ 사 업 량 : 지곡배수지 기본 및 실시설계용역

○ 소요예산 : 550백만원 (시비)

○ 사    유 : 지곡배수지 건설을 위한 기본 및 실시설계용역

7. 연도별 투자계획                                           (단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘11년	‘12년∼	비 고
계		13,500		550	12,950
국비	국고보조
	균특회계
	특 교 세
도 비
시 비		13,500		550	12,950

ꊵ 노후(불용)관 정비 및 구관막기 공사(125쪽)

(급수과, 권재명, 220-7844)

1. 사업목적 및 필요성

○ 각종 공사시 지하에 매설되어 남아있는 불용관정비로 환경개선

○ 기존급수관이 노후되고 다발관으로 매설되어 관로 통합 및 교체가 시급한 구간에

대하여 관로 통합공사 실시

○ 개인계량기 폐전 신청시 발생하는 기존급수관의 신속한 철거로 누수원인 사전예방

2. 사업근거 및 추진경위

○ 관로가 노후되고 기능이 저하된 기존관(다발관) 등을 즉시 정비할 수 있도록 단가계약      체결 긴급을 요하는 공사에 즉시 시행하여 주민불편 최소화 및 예산낭비 요인 사전 제거

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 전주시 일원

○ 사업규모 : 노후(불용)관 정비 100m, 구관막기 73개소

○ 총사업비 : 72백만원

○ 사업기간 : 2011.  1월 ∼ 2011. 12월

○ 지원형태 : 직접수행

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 용역과제 심사 이행( 무 )

5. 그간 추진사항

○ 2010년 정비사항 L=150m, 구관막기 70개소

6. ‘11년 예산소요

○ 사 업 량 : 노후불용관 정비 100m, 구관막기 73개소

○ 소요예산 : 72백만원

7. 연도별 투자계획                                           (단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘11년	‘12년∼	비 고
계		72		72
국비	국고보조
	균특회계
	특 교 세
도 비
시 비		72		72

ꊶ 긴급누수 복구 및 누수탐사(125쪽)

(급수과, 권재명, 220-7844)

1. 사업목적 및 필요성

○ 상수도 시설물에서 발생하는 돌발적인 누수를 효율적으로 긴급복구 함으로써

위험요소 제거 및 신속하게 수돗물을 수용가에게 공급

○ 누수탐사를 시행함으로써 누수지역을 사전에 확인, 복구하여 유수율 향상에 기여

2. 사업추진근거

○ 맑은물공급사업 시행시 제외지역에 대한 유수율 향상에 기여코자함

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 전주시 일원

○ 사업규모 : 누수복구 및 탐사 400개소

○ 총사업비 : 400백만원

○ 사업기간 : 2011.  1월 ∼ 2011. 12월

○ 지원형태 : 직접수행

4. 사전 행정절차 이행

○ 해 당 없 음

5. 그간 추진사항

○ 2010년 정비 사항 537개소

6.’11년 예산소요

○ 사 업 량 : 누수복구 및 탐사 400개소

○ 소요예산 : 400백만원

○ 필 요 성 : 돌발 누수 증가로 인한 공사량 증가

7. 연도별 투자계획                                          (단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘11년	‘12년∼	비 고
계		400		400
국비	국고보조
	균특회계
	특 교 세
도 비
시 비		400		400

ꊷ 공업용수 도수관 PE 갱생공사(154쪽)

(수질관리과, 김용호, 220-7871)

1. 사업목적 및 필요성

○ 매년 잦은 누수로 인한 돌발사고 발생 및 공업용수 공급 차질을 방지하고 도수관 인접 농가의 민원 해소

2. 사업근거 및 추진경위

○ 노후된 공업용수 도수관을 개량(PE갱생)하여 안정적인 공업용수 공급 및

생산성 향상에 기여

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 고랑동 일원

○ 사업규모 : 도수관 (D700mm) 개량(PE갱생) L = 410m

○ 총사업비 : 240백만원

○ 사업기간 : 2011. 3월 ∼ 2011. 5월

○ 지원형태 : 직접수행

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 해당 없음

5. 그간 추진사항

○ ′08년 ∼ ′10년까지 도수관 개량(PE갱생) : 총 3,825m중 1,486m완료

6. 연도별 투자계획(계속)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘11년	‘12년∼	비 고
계		2,101	733	240	1,128
국비	국고보조
	균특회계
	특 교 세
도 비
시 비		2,101	733	240	1,128

ꊸ 상수도시설물 정밀점검 용역(154쪽)

(수질관리과, 김용호, 220-7871)

1. 사업목적 및 필요성

○ 취․정수장 안전점검을 통하여 적정한 유지관리 추진, 재해 재난 예방 및 시설물의

효용성 증진

2. 사업근거 및 추진경위

○ 시설물 안전관리에 관한 특별법 : 상수도시설물 1회/2년 이상 정밀점검 용역 시행

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 대성정수장 등 4개 사업장

○ 사업규모 : 상수도시설물 정밀점검 용역 1식

○ 총사업비 : 12백만원

○ 사업기간 : 2011. 5월 ∼ 2011. 6월

○ 지원형태 : 용역

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 해당 없음

5. 그간 추진사항

6. 연도별 투자계획(계속)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘11년	‘12년∼	비 고
계		73	61	12
국비	국고보조
	균특회계
	특 교 세
도 비
시 비		73	61	12

ꊹ 배수지 내부 개량공사(천마배수지)(154쪽)

(수질관리과, 김용호, 220-7871)

1. 사업목적 및 필요성

○ 배수지 내부콘크리트의 노후 및 부식작용 등으로 인한 구조물 내구성 저하로 누수 및 2차 수질오염 발생이 우려되어 배수지 내부개량 시행

2. 사업근거 및 추진경위

○ 노후된 배수지 내부시설로 인한 2차 수질오염 우려로 콘크리트 표면을 세라믹

수지공법으로 도장, 구조물 내구성 증대 및 먹는물 수질보전

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 호성동 1가 산36-4번지

○ 사업규모 : 배수지 도장 2지(1, 2호지 A=3,362㎡)

○ 총사업비 : 497백만원

○ 사업기간 : 2011. 2월 ∼ 2011. 4월

○ 지원형태 : 직접수행

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 해당 없음

5. 그간 추진사항

6. 연도별 투자계획(계속)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘11년	‘12년∼	비 고
계		995		497	498
국비	국고보조
	균특회계
	특 교 세
도 비
시 비		995		497	498

전미취수장 유공관 준설 공사(154쪽)

(수질관리과, 김용호, 220-7871)

1. 사업목적 및 필요성

○ 공업용수 취수지점에 매설되어 있는 유공관 시설이 20년 이상 경과되어 토사 유입 퇴적에 따른 집합정 원수유입 지난으로 용수공급 차질을 개선하고자함

2. 사업근거 및 추진경위

○ 유공관 유입토사를 준설, 안정적인 공업용수 원수공급 및 생산성 향상에 기여

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 전미동 전미취수장(만경강 유공관)

○ 사업규모 : 유공관 (D800 ∼ 1350mm) L=900m 준설

○ 총사업비 : 90백만원

○ 사업기간 : 2011. 3월 ∼ 2011. 4월

○ 지원형태 : 직접수행

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 해당 없음

5. 그간 추진사항

6. 연도별 투자계획(계속)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘11년	‘12년∼	비 고
계		90		90
국비	국고보조
	균특회계
	특 교 세
도 비
시 비		90		90

대성정수장 약품투입실 CCTV 설치(155쪽)

(수질관리과, 노성근, 220-7883)

1. 사업목적 및 필요성

○ 대성정수장 약품투입실 내 응집제 투입기 및 전염소 측정기의 원활한 운영을 위하여

CCTV를 설치, 돌발상황 신속대처 등 수돗물 생산공정의 철저한 관리

2. 사업근거 및 추진경위

○ 약품 투입시설의 24시간 작동상태 실시간 모니터링으로 주요시설 원격감시

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 전주시 완산구 대성동 479-1 대성정수장 내

○ 사업규모 : 카메라 2대, 9채널녹화장치, 전원 및 통신케이블 등 1식

○ 총사업비 : 10백만원

○ 사업기간 : 2011. 2월 ∼ 2011. 3월

○ 지원형태 : 직접수행

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 해당 없음

5. 그간 추진사항

6. 연도별 투자계획(계속)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘11년	‘12년∼	비 고
계		10		10
국비	국고보조
	균특회계
	특 교 세
도 비
시 비		10		10

대성정수장 응집기 노후 수차 교체(155쪽)

(수질관리과, 김주태, 220-7872)

1. 사업목적 및 필요성

○ 설비 노후화 및 잦은 고장에 따른 불규칙 운전 발생을 방지하는 시설 개선으로

응집효율 향상시켜 맑고 깨끗한 청정 수돗물을 생산 공급하고자 함

2. 사업근거 및 추진경위

○ 기계장치 시설물 개량, 현대화 운영으로 맑고 깨끗한 수돗물 생산공급

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 전주시 완산구 대성동 479-1[대성정수장]

○ 사업규모 : 응집기 수차 5HP용 ∗ 3대 교체1식

(응집기 수차축 ∅90㎜)∗(길이:2.45M/대∗수량4/조)]∗3대

○ 총사업비 : 60백만원

○ 사업기간 : 2011. 2월 ∼ 2011. 6월

○ 지원형태 : 직접수행

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 해당 없음

5. 그간 추진사항

○ 응집기 수차 5HP용(1, 2池)∗2대 : ‘75. 10월 준공(35년 경과)

○ 응집기 수차 5HP용(3池)∗1대 : ‘94. 12월 준공(16년 경과)

6. 연도별 투자계획(계속)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	´11년	‘12년∼	비고
계		60		60
국비	국고보조
	균특회계
	특 교 세
도 비
시 비		60		60

하수도 공기업 특별회계

Ⅱ 주요 세부사업 설명서

	【하수과 소관】
	ꊱ 하수처리장 민간위탁 운영비	---	38
	위생처리장 민간위탁 운영비	---	39
	위생처리장 분뇨처리 징수보상금	---	40
	하수관거 BTL사업 민간위탁 운영비	---	41
	하수처리 편입구역 하수관거사업	---	42
	중앙처리구역 하수관거 정비사업	---	43
	효자처리구역 하수관거 정비사업	---	44
	농촌마을 하수도정비사업(매암,진기,원석구지구)	---	45
	하수관거 신설 ․개량사업(완산구)	---	46
	하수도 유지관리사업(완산구)	---	47
	하수관거 신설 ․개량사업(덕진구)	---	48
	하수도 유지관리사업(덕진구)	---	49
	하수처리장 기계․전기 등 노후설비 교체공사	---	50
	하수처리장 건축․토목 및 차집관로 유지공사	---	51
	마을하수처리시설 개량 및 보수	---	52
	하수슬러지 처리시설	---	53
	전주하수처리장 총인처리시설	---	54
	하수관거 BTL사업 시설 임대료	---	55
	합류식하수도 월류수(CSOs)처리시설 설치	---	56

ꊱ 하수처리장 민간위탁 운영비(253쪽)

(하수과, 박춘성, 220-7796)

1. 사업목적 및 필요성

○ 환경기초시설 설치 및 운영에 민간자본과 기술을 이용하여 하수처리장을

효율적으로 운영하기 위함

2. 사업근거 및 추진경위

○ 전주 하수종말처리시설 3단계증설 민간투자사업 변경(2차)협약 제40조

○ 사업수행주체 : 전주개발(주)

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 덕진구 송천동 2가 1035번지

○ 시설규모 : 403,000톤/일

○ 총운영비 : 10,444백만원/년(운영비 8,736, 슬러지정산비 1,708)

○ 운영기간 : 2004. 12 ∼ 2024. 11

○ 지원형태 : 하수처리량에 따라 월별 정산 지급

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 중기지방재정계획 반영(  )       ○ 투․융자 심사 이행(  )

○ 공유재산관리계획 승인(  )       ○ 용역과제 심사 이행(  )

5. 그간 추진사항

○  9,101백만원/‘08년, 9,429백만원/‘09년, 10,020백만원/‘10년

6. ‘11년 예산소요

○ 사 업 량 : 325,000톤/일

○ 소요예산 : 6,377백만원

○ 사    유 : 하특 세입부족으로 운영비 7개월분 반영, 부족분 추경 반영

7. 연도별 투자계획(신규/계속)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘11년	‘12년∼	비 고
계		6,377		6,377
국비	국고보조
	균특회계
	특 교 세
도 비
시 비		6,377		6,377
기 금

위생처리장 민간위탁 운영비(253쪽)

(하수과, 박춘성, 220-7796)

1. 사업목적 및 필요성

○ 환경기초시설 설치 및 운영에 민간자본과 기술을 이용하여 위생처리장을

효율적으로 운영하기 위함

2. 사업근거 및 추진경위

○ 전주 하수종말처리시설 3단계증설 민간투자사업 변경(2차)협약 제40조

○ 사업수행주체 : 전주개발(주)

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 덕진구 송천동2가 1035번지

○ 사업규모 : 290㎘/일

○ 총사업비 : 325백만원

○ 사업기간 : 2004. 12 ∼ 2024. 11

○ 지원형태 : 위생처리장 분뇨처리량에 따라 매월 지급

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 중기지방재정계획 반영(  )       ○ 투․융자 심사 이행(  )

○ 공유재산관리계획 승인(  )       ○ 용역과제 심사 이행(  )

5. 그간 추진사항

○ 344백만원/‘08년, 356백만원/‘09년, 372백만원/‘10년

6. ‘11년 예산소요

○ 사 업 량 : 290㎘/일

○ 소요예산 : 325백만원

○ 사    유 : 분뇨발생 예측량 × 처리단가(3,491원/톤)

7. 연도별 투자계획(신규/계속)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘11년	‘12년∼	비 고
계		325		325
국비	국고보조
	균특회계
	특 교 세
도 비
시 비		325		325
기 금

위생처리장 분뇨처리 징수보상금(253쪽)

(하수과, 박춘성, 220-7796)

1. 사업목적 및 필요성

○ 분뇨처리장 사용료 위탁징수 보상금

2. 사업근거 및 추진경위

○ 전주시 오수․ 분뇨 및 축산폐수 처리에 관한 조례 제14조

○ 사업수행주체 : 분뇨운반업체 가가환경 외 12개

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 덕진구 송천동2가 1035번지

○ 사업규모 : 290㎘/일

○ 총사업비 : 13백만원/년

○ 사업기간 : 2004. 12 ∼ 2024. 11

○ 지원형태 : 위생처리장 사용료의 10%를 징수교부금으로 교부

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 중기지방재정계획 반영(  )       ○ 투․융자 심사 이행(  )

○ 공유재산관리계획 승인(  )       ○ 용역과제 심사 이행(  )

5. 그간 추진사항

○  14백만원/‘08년, 13백만원/‘09년, 14백만원/‘10년

6. ‘11년 예산소요

○ 사 업 량 : 290㎘/일

○ 소요예산 : 13백만원

○ 사    유 : 분뇨반입수수료 10% 징수교부금 지급(수수료 1,380원/톤)

7. 연도별 투자계획(신규/계속)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘11년	‘12년∼	비 고
계		13		13
국비	국고보조
	균특회계
	특 교 세
도 비
시 비		13		13
기 금

ꊴ 하수관거 BTL사업 민간위탁 운영비(254쪽)

(하수과, 정훈, 220-7793)

1. 사업목적 및 필요성

○ 새만금 상류지역의 하천수질을 조기에 개선하여 만경강 생태계를 복원,

성공적인 새만금사업 추진에 기여

○ 사업완료 후 사업시행자 운영기간(20년) 동안 시설임대료 및 운영비 지급

2. 사업근거 및 추진경위

○ 사업근거 : 사회기반시설에 대한 민간투자법․시행령, 민간투자사업기본계획

○ 하수관거BTL사업 협약(환경부, 전주시, 환경관리공단) ---------- ‘05.06.

○ 하수관거BTL사업 실시협약(전주시. 환경관리공단, 사업시행자) --- ‘06.03.

3. 사 업 개 요

○ 위       치 : 덕진구 송천동 외 10개동(덕진, 아중, 중앙, 화산, 효자처리구역)

○ 사 업 규 모 : 우․오수관거정비 L=116㎞, 배수설비 8,725세대

○ 투자사업비 : 105,196백만원(민간투자비, ‘05. 6월기준 불변가격)

○ 사 업 기 간 : 2005 ∼ 2010. 5(6개년)

○ 사업시행자 : 전주아랫물길주식회사(시공자 : GS건설 외 5개사)

○ 운 영 금 액 : 19,622백만원(시비)

○ 운 영 기 간 : 2010. 6. ∼ 2030. 5. (20년)

4. 그간 추진사항

○ 2010년 5월부터 민간위탁(437백만원 지급)

5. ‘11년 예산소요

○ 운영비 지급 : ‘11. 3. ～ ’11. 12.(분기별 지급)

○ 소 요 예 산 : 743백만원(확보액 557) - 하특 예산부족으로 부족액 추경 확보

○ 사       유 : 민간투자법에 의한 완료사업으로 20년 동안 운영비 지급

6. 연도별 투자계획(계속)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘11년	‘12년∼	비 고
계		19,622	437	557	18,628
국비	국고보조
	균특회계
	특 교 세
시 비		19,622	437	557	18,628
기 금

하수처리 편입구역 하수관거사업(269쪽)

(하수과, 정훈, 220-7793)

1. 사업목적 및 필요성

○ 도심하천 상류지역의 생활오수를 차집하여 하수처리장에 유입

○ 공공수역 수질오염 방지로 하천의 쾌적한 수변공간 제공

○ 농촌동 마을하수도 개량으로 시민 보건위생 증진

2. 사업근거 및 추진경위

○ 사업근거 : 하수도법 제11조(공공하수도 설치)

○ 하수도정비 기본계획변경승인(환경부) ----------------------- ‘07.07

○ 지방재정 투융자심사(행정자치부) --------------------------  ‘07.10

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 평화동 장교마을 등 48개 마을

○ 사업규모 : 하수관거설치 L=76.4㎞

○ 총사업비 : 39,844백만원(국비 19,790,  지방비 20,054)

○ 사업기간 : 2007 ∼ 2012(6개년)

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 중기지방재정계획 반영(○)       ○ 투․융자 심사 이행  (○)

○ 공유재산관리계획 승인(  )       ○ 용역과제 심사 이행(○)

5. 그간 추진사항

○ 실시설계용역 보완 완료 ---------------------------------  ‘08.08

○ 행정절차이행 (재원협의, 설계자문등) ----------------------   ‘08.08

○ 공사추진(4개지구 : 중복․전주천,평화,중인,박물관지구) ----  ‘08.10∼’10.11

- 하수관거 L=76.4㎞ 중 18.2㎞ 완료

6. ‘11년 예산소요

○ 사 업 량 : 하수관거 L=14㎞

○ 소요예산 : 7,666백만원(국비 4,183,  지방비 3,483)

- 시설비 7,258,  감리비 400,  부대비 8

○ 사    유 : 장기계속사업(국고보조사업)

7. 연도별 투자계획(계속)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘11년	‘12년∼	비 고
계		39,844	12,243	7,666	19,935
국비	국고보조	19,790	7,511	4,183	8,096
	균특회계
	특 교 세
시 비		17,046	3,462	2,782	10,802
기 금		3,008	1,270	701	1,037

중앙처리구역 하수관거 정비사업(269쪽)

(하수과, 장의환, 220-7792)

1. 사업목적 및 필요성

○ 새만금 상류지역의 하천수질을 조기에 개선하여 만경강 생태계를 복원,

성공적인 새만금사업 추진에 기여하고

○ 진행중인 노송천, 건산천 자연형하천 복원사업 구간의 시너지효과 극대화로

시민에게 생명력 있는 수변공간 제공

○ 하천수, 지하수, 우수 등 불명수 감소로 인한 하수처리 경영 합리화

2. 사업근거 및 추진경위

○ 사업근거 : 하수도법 제11조(공공하수도 설치)

○ 하수도정비 기본계획변경승인(환경부) ----------------------- ‘07.07

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 완산구 풍남동,교동,노송동 일원

○ 사업규모 : 우․오수관거정비 L=27.6㎞

○ 총사업비 : 30,000백만원(국비 15,000,  지방비 15,000)

○ 사업기간 : 2009 ∼ 2012(4개년)

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 중기지방재정계획 반영(○)       ○ 투․융자 심사 이행  (○)

○ 공유재산관리계획 승인(  )       ○ 용역과제 심사 이행(○)

5. 그간 추진사항

○ 실시설계용역 완료 및 행정절차 이행 ------------------------ ’09.10

○ 공사 착수             -----------------------------------  ‘10.01

- 하수관거 L=27.6㎞ 중 5㎞ 완료

6. ‘11년 예산소요

○ 사 업 량 : 하수관거정비 L=8.0㎞

○ 소요예산 : 3,545백만원(국비 1,725, 지방비 1,820)

- 시설비 3,139,  감리비 400,  부대비 6

○ 사    유 : 장기계속사업(국고보조사업)

7. 연도별 투자계획(계속)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘11년	‘12년∼	비 고
계		30,000	7,058	3,545	19,397
국비	국고보조	15,000	2,720	1,725	10,555
	균특회계
	특 교 세
시 비		12,750	4,002	1,193	7,555
기 금		2,250	336	627	1,287

효자처리구역 하수관거 정비사업(270쪽)

(하수과, 장의환, 220-7792)

1. 사업목적 및 필요성

○ 새만금 상류지역의 하천수질을 조기에 개선하여 만경강 생태계를 복원,

성공적인 새만금사업 추진에 기여하고

○ 공공수역 수질오염 방지로 하천의 쾌적한 수변공간 제공

○ 하천수, 지하수, 우수 등 불명수 감소로 인한 하수처리 경영 합리화

2. 사업근거 및 추진경위

○ 사업근거 : 하수도법 제11조(공공하수도 설치)

○ 지방재정 투융자심사(전라북도) ---------------------------- ‘09.10

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 완산구 효자동, 송천동 처리장 주변마을

○ 사업규모 : 우․오수관거정비 L=25.0㎞

○ 총사업비 : 20,000백만원(국비 10,000,  지방비 10,000)

○ 사업기간 : 2011 ∼ 2014(4개년)

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 중기지방재정계획 반영(○)       ○ 투․융자 심사 이행  (○)

○ 공유재산관리계획 승인(  )       ○ 용역과제 심사 이행(○)

5. 그간 추진사항

○ 중기지방재정계획 및 투․융자심사 --------------------------- ’09.10

○ 용역과제 심사 완료 -------------------------------------- ‘09.11

※ ‘11 신규 국고보조사업 반영

6. ‘11년 예산소요

○ 사 업 량 : 실시설계용역 1식

○ 소요예산 : 1,000백만원(국비 500, 지방비 500)

○ 사    유 : 신규사업 반영에 따른 실시설계용역 추진

7. 연도별 투자계획(계속)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘11년	‘12년∼	비 고
계		20,000	49	1,000	18,951
국비	국고보조	10,000		500	9,500
	균특회계
	특 교 세
시 비		8,500	49	455	7,996
기 금		1,500		45	1,455

농촌마을 하수도정비사업(매암,진기,원석구)(270쪽)

(하수과, 김춘식, 220-7795)

1. 사업목적 및 필요성

○ 농촌지역의 열악한 주건환경을 개선하여 주민생활 편익도모

○ 공공수역의 수질개선과 지역주민의 보건위생 향상에 기여

2. 사업근거 및 추진경위

○ 사업근거 : 하수도법 제11조(공공하수도 설치)

○ 하수도정비 기본계획변경승인(환경부)           : ‘07.07

○ 지방재정 투융자심사 (전북도, 전주시)          : ‘08.11

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 매암 외 2개지구(진기, 원석구)

○ 사업규모 : 처리시설 Q= 320㎥/일(매암 190, 진기  70, 원석구 60)

하수관거 L= 14.7㎞  (매암 8.7,  진기 6.0)

○ 총사업비 : 9,642백만원(국비 6,533  지방비 3,109) - 국비 70%

○ 사업기간 : 2009 ∼ 2013(5개년) / ○ 지원형태 : 직접수행

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 중기지방재정계획 반영(○)       ○ 투․융자 심사 이행  (○)

○ 공유재산관리계획 승인(  )       ○ 용역과제 심사 이행(○)

5. 그간 추진사항

○ 매암 및 진기지구 인가                              : ‘09. 11 ∼ ’10. 02

○ 매암지구 공사착공(1,2차분)                         : ‘09. 12

○ 매암지구 2차분 공사완료                           : ‘10. 06

○ 매암지구 1차분 변경 추진(처리장 ⇒ 관로공사 변경)  : ‘10. 08

○ 매암지구 3차분 착공                               : ‘10. 11

6. ‘11년 예산소요

○ 사 업 량 : 처리시설 Q= 320㎥/일, 하수관거 L= 14.7㎞

○ 소요예산 : 867백만원(국비 801,  지방비 66)

○ 사    유 : 신규, 국비보조사업으로 책정

7. 연도별 투자계획(신규/계속)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘11년	‘12년∼	비 고
계		9,642	1,601	867	7,174
국비	국고보조	6,533	1,092	801	4,640
	균특회계
	특 교 세
도 비
시 비		2,643	434		2,209
기 금		466	75	66	325

하수관거 신설․개량사업(완산구)(271쪽)

(완산구청 건설과 하수도관리담당 최소영 220-5441)

1. 사업목적 및 필요성

○ 노후 및 배수불량 하수도의 개량을 통한 상습 침수지역 개선으로 시민 불편사항       해소 및 쾌적한 도시환경을 조성하고자 함

2. 사업근거 및 추진경위

○ 사업근거 : 하수도법 제11조(공공하수도 설치)

○ 사업수행 주체 : 완산구청 건설과

○ 사업진행 절차

사업수요조사 (동 협조)	⇒	우선사업 대상지 조사	⇒	실시설계	⇒	사업추진
(′10.10.~12.)		(′10.12~′11.01)		(′11.02~03)		(′11.04~12)

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 완산구 관내 하수도 개량 대상지역

○ 사업규모 : D=300~800mm L=920m

○ 총사업비 : 310백만원

○ 사업기간 : 2011. 2 ∼ 2011. 12

○ 지원형태 : 직접수행

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 해당없음

5. 그간 추진사항

○ 2011년 하수도 시설개량 사업 수요조사 : 2010. 10. ∼ 12.

6. ‘11년 예산소요

○ 사 업 량 : 하수도 시설개량 D=300~800mm L=920m

○ 소요예산 : 310백만원

○ 사    유 : 2011년도 확보된 예산으로 사업 추진

7. 연도별 투자계획(신규/계속)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘11년	‘12년∼	비 고
계		310		310
국비	국고보조
	균특회계
	특 교 세
도 비
시 비		310		310

하수도 유지관리사업(완산구)(271쪽)

(완산구청 건설과 하수도관리담당 최소영 220-5441)

1. 사업목적 및 필요성

○ 하수도 시설물 노후로 인한 함몰 등 시설물 파손으로 인한 안전사고에 대비

○ 배수불량 및 우기철 집중호우로 인한 침수피해의 예방과 악취발생 요인제거를       위한 유지관리 사업시행으로 시민불편사항의 최소화 도모

2. 사업근거 및 추진경위

○ 사업근거 : 하수도법 제11조(공공하수도 설치)

○ 사업수행 주체 : 완산구청 건설과

○ 사업추진방향

- 하수도 시설물 파손지역 긴급복구

- 준설토 및 슬러지 적치로 인한 배수불량 구간 준설

- 합류식관거 설치 지역 중 다중집합장소 및 주택밀집지역 등에 악취방지시설설치

- 집중호우로 하수도 역류가 발생하는 구도심 등 저지대 지역 대상 역류방지시설 설치

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 완산구 관내

○ 사업규모 : 악취방지지설 120개소, 우수받이 신설 및 보수 100개소

하수도 준설 20km, 긴급보수 200개소, 역류방지시설설치 100개소

○ 총사업비 : 644백만원

○ 사업기간 : 2011. 1 ∼ 2011. 12

○ 지원형태 : 직접수행

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 해당없음

5. 그간 추진사항

○ 2011년 하수도 시설개량 사업 수요조사 : 2010. 10. ∼ 12.

6. ‘11년 예산소요

○ 사 업 량 : 악취방지지설 120개소, 우수받이 신설 및 보수 100개소

하수도 준설 20km, 긴급보수 200개소, 역류방지시설설치 100개소

○ 소요예산 : 644백만원

○ 사    유 : 2011년도 확보된 예산으로 사업 추진

7. 연도별 투자계획(신규/계속)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘11년	‘12년∼	비 고
계		644		644
국비	국고보조
	균특회계
	특 교 세
도 비
시 비		644		644

하수관거 신설․개량사업(덕진구)(271쪽)

(덕진구청 건설과 하수도관리담당 이상복 270-6471)

1. 사업목적 및 필요성

○ 노후화된 하수시설 및 하수도 미설치 지역 등 배수가 원활하지 않은 지역을       개량하여 상습침수 해소 및 쾌적한 도시환경을 조성하고자 함

2. 사업근거 및 추진경위

○ 사업추진 대상

- 관리대상 하수관거 연장 L= 706.2㎞(덕진구 하수처리구역)

○ 사업추진방향

- 하수도 노후파손, 시설기준 미달 등 배수불량지역 및 장마철 상습피해 침수지역 민원다발지역 등 우선 추진

※ 농촌동 및 기 시행중인 하수처리편입구역 및 중앙처리구역 제외

○ 사업수행 주체 : 덕진구청 건설과

○ 사업진행 절차

1차 수요조사 (동 협조)	⇒	우선사업 대상지 조사	⇒	실시설계	⇒	사업추진
(‘10.10.~12.)		(‘10.12~‘11.01) 350백만원		(‘11.01~04)		(‘11.04~12)

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 덕진구 관내 하수도 개량 대상 지역

○ 사업규모 : 하수도 시설개량 L = 1,000ｍ(D300~D1000㎜)

○ 총사업비 : 350백만원,      ○ 사업기간 : 2011. 2. ∼ 12.

○ 지원형태 : 직접수행

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 해당없음

5. 그간 추진사항

○ 2011년 하수도 시설개량 사업 수요조사  : 2010. 09. ∼ 12.

6. ‘11년 예산소요

○ 사 업 량 : 하수도 시설개량 L = 1,000ｍ(D300∼D1000㎜)

○ 소요예산 : 350백만원

○ 사    유 : 2011년 예산 확보액 범위내에서 우선 시급한 구간 시행

7. 연도별 투자계획(신규/계속)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘11년	‘12년∼	비 고
계		350		350
국비	국고보조
	균특회계
	특 교 세
도 비
시 비		350		350

(단위 : 백만원)

하수도 유지관리사업(덕진구)(271쪽)

(덕진구청 건설과 하수도관리담당 이상복 270-6471)

1. 사업목적 및 필요성

○ 장마철 및 집중호우로 인하여 배수불량, 하수도 막힘, 시설물 파손, 노면물고임       지역 등에 대하여 시설물보수 및 하수도준설을 실시하여 하수도 시설물 유지       관리에 만전을 기함으로써 시민들의 생활불편 해소 및 사전 재해 예방

2. 사업근거 및 추진경위

○ 사업추진 대상

- 관리대상 하수관거 연장 L= 706.2㎞(덕진구 하수처리구역)

○ 사업추진방향

- 관로 긴급사공에 대한 응급복구

- 우․오수 역류지역 : 퇴적토사 및 슬러지로 통수단면 부족구간

- 노면수 배수처리시설 불량지역 및 맨홀 파손구간

- 우․오수 합류식 지역 중 주택지역 악취발생구간에 대하여 악취방지시설 설치

○ 사업수행 주체 : 덕진구청 건설과

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 덕진구 관내

○ 사업규모 : 하수도 유지관리 L = 706.2㎞

- 긴급보수 200개소,                   - 하수도 준설      20개소 / 15㎞,

- 우수받이신설 및 맨홀보수 100개소,   - 악취방지시설 설치 50개소

○ 총사업비 : 563백만원,          ○ 사업기간 : 2011. 2. ∼ 12.

○ 지원형태 : 직접수행

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 해당없음

5. 그간 추진사항

○ 2011년 하수도시설 개량사업 수요조사 : 2010.09 ∼ 12

6. ‘11년 예산소요

○ 사 업 량

- 긴급보수 200개소,                   - 하수도 준설      20개소 / 15㎞,

- 우수받이신설 및 맨홀보수 100개소,   - 악취방지시설 설치 50개소

○ 소요예산 : 563백만원

7. 연도별 투자계획(신규/계속)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘11년	‘12년∼	비 고
계		563		563
국비	국고보조
	균특회계
	특 교 세
도 비
시 비		563		563

(단위 : 백만원)

하수처리장 기계․전기 등 노후설비 교체공사(274쪽)

(하수과, 한복수, 220-7797)

1. 사업목적 및 필요성

○ 내구연한이 경과된  노후시설에 대하여 대수선공사 실시로 하수처리시설의  효율 제고 및 안정적 방류수질 확보

2. 사업근거 및 추진경위

○ 전주시와 전주개발(주)간의 변경(2차)협약(‘07.10.5)제45조⑧ 및 ⑨항의 내구년한이 경과한 시설물은 전주시에서 부담하여 교체

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 송천동 2가 1035번지

○ 사업규모 : 기계 및 전기 등 노후설비 시설교체 1식

○ 총사업비 : 1,000백만원

○ 사업기간 : ‘11. 1 ∼ ’11. 12

○ 지원형태 : 직접수행

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 중기지방재정계획 반영(  )       ○ 투․융자 심사 이행(  )

○ 공유재산관리계획 승인(  )       ○ 용역과제 심사 이행(  )

5. 그간 추진사항

○ 2011년 대수선사업 보수대상 시설 조사 : ‘10. 11

6. ‘11년 예산소요

○ 사 업 량 : 기계 및 전기시설교체 1식,

○ 소요예산 : 1,000백만원

○ 사    유 : 환경사업소 노후된 시설물 교체

7. 연도별 투자계획(신규/계속)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘11년	‘12년∼	비 고
계		1,000		1,000
국비	국고보조
	균특회계
	특 교 세
도 비
시 비		1,000		1,000
기 금

하수처리장 건축․토목 및 차집관로 유지공사(274쪽)

(하수과, 한복수, 220-7797)

1. 사업목적 및 필요성

○ 공공하수도에서 하수처리장으로 연결되는 차집관로 불명수 유입방지 위한 보수공사 추진으로 하수처리비용 증가요인 제거

○ 하수처리장 건축시설에 대한 보수공사 추진으로 시설물 관리에 만전을 기함

2. 사업근거 및 추진경위

○ 시특법 시행령 제6조에 의거 시설물 유지보수 및 안정성 확보

○ 공공하수도 시설물 유지관리를 위한 보수 공사 추진

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 전주시 송천동 전주하수처리장 및 차집관로 등

○ 사업규모 : 하수처리장 시설물보수(건축물 및 차집관로 등)보수 1식

○ 총사업비 : 200백만원

○ 사업기간 : ‘11. 1 ∼ 12

○ 지원형태 : 직접수행

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 중기지방재정계획 반영(  )       ○ 투․융자 심사 이행(  )

○ 공유재산관리계획 승인(  )       ○ 용역과제 심사 이행(  )

5. 그간 추진사항

○ 하수처리장 시설물 보수 대상 조사 : ‘10. 11

6. ‘11년 예산소요

○ 사 업 량 : 하수처리장 시설물보수(건축물 및 차집관로 등)보수 1식

○ 소요예산 : 200백만원

○ 사    유 : 하수처리장 시설물 관리를 위한 유지 보수

7. 연도별 투자계획(신규/계속)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘11년	‘12년∼	비 고
계		200		200
국비	국고보조
	균특회계
	특 교 세
도 비
시 비		200		200
기 금

마을하수처리시설 개량 및 보수(274쪽)

(하수과, 김춘식, 220-7795)

1. 사업목적 및 필요성

○ 공공수역의 수질개선과 지역주민의 보건위생 향상을 위해 설치한 농촌마을 공공하수처리시설 개량 및 보수공사 추진으로 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

2. 사업근거 및 추진경위

○ 농촌마을 공공하수처리시설 개량 및 유지보수 공사 추진

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 덕진구 금상동 삼천마을 외 9개소

○ 사업규모 : 마을하수처리시설 개량 및 보수 1식

○ 총사업비 : 100백만원

○ 사업기간 : ’11. 1 ∼ 12

○ 지원형태 : 직접수행

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 중기지방재정계획 반영(  )       ○ 투․융자 심사 이행(  )

○ 공유재산관리계획 승인(  )       ○ 용역과제 심사 이행(  )

5. 그간 추진사항

○ 전주시 관내 마을하수처리시설 현지조사 : ‘10. 10 ∼ 11

6. ‘11년 예산소요

○ 사 업 량 : 마을하수처리시설 개량 및 보수 1식

○ 소요예산 : 100백만원

○ 사    유 : 마을하수처리시설 유지관리를 위한 개량 및 보수

7. 연도별 투자계획(신규/계속)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘11년	‘12년∼	비 고
계		100		100
국비	국고보조
	균특회계
	특 교 세
도 비
시 비		100		100
기 금

하수슬러지 처리시설(276쪽)

(하수과, 박춘성, 220-7796)

1. 사업목적 및 필요성

○ 2012년 해양투기 금지 정책에 따라 대책마련 필요

○ 하수찌꺼기의 안정적 처리로 자연환경보전에 기여

2. 사업근거 및 추진경위

○ 사업근거 : 환경부시책 사업 및 슬러지 해양투기 금지 방침

○ 자원관리과 종합리싸이클링 타운 조성사업과 병행추진

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 완산구 삼천동 안산, 삼산마을 인근

○ 사업규모 : 하수찌꺼기 처리시설 150톤/일(감량화 100톤 포함)

○ 총사업비 : 34,710백만원(국비 17,350  민자 및 기타 17,360) - 국비 50%

○ 사업기간 : 2003 ∼ 2011. 12

○ 지원형태 : 민간투자

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 중기지방재정계획 반영(○)       ○ 투․융자 심사 이행(○)

○ 공유재산관리계획 승인(  )       ○ 용역과제 심사 이행(○)

5. 그간 추진사항

○ 종합 리싸이클링타운 민간투자사업으로 추진             : ‘09. 3

○ 사업추진방식 결정(민자투자 정부고시 방식)              : ‘09. 8

○ 민간투자 적격성조사 완료                               : ‘10. 3

○ 민투사업 지정, 민투심의 고시, 시설사업기본계획 고시 : ‘10. 8 ∼ 9

6. ‘11년 예산소요

○ 사 업 량 : 하수찌꺼기 처리시설 150톤/일(감량화 100톤)

○ 소요예산 : 435백만원

○ 사    유 : 환경부 ‘11년 국고보조금 내시에 따른 예산편성

7. 연도별 투자계획(계속)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘11년	‘12년∼	비 고
계		34,710	1,071	435	33,204
국비	국고보조	17,350	181	390	16,779
	균특회계
	특 교 세
도 비
시 비		612	612
기 금		1,735	278	45	1,412
민간 투자		15,013			15,013

전주하수처리장 총인처리시설(276쪽)

(하수과, 박춘성, 220-7796)

1. 사업목적 및 필요성

○ 새만금 상류지역은 방류수 수질기준이 2012.1.1일부터 총인(T-P) 2.0 ⇨ 0.2mg/L이하로 강화되어  “총인” 처리시설 설치 필요

2. 사업근거 및 추진경위

○ 하수도법 개정으로 방류수질 기준 강화(2012.1.1일부터 시행)

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 송천동 환경사업소 내

○ 사업규모 : 403천㎥/일 총인(T-P) 2.0 ⇨ 0.2mg/L이하

○ 총사업비 : 24,200백만원(국비 12,100, 도비 6,050, 시비 6,050)

○ 사업기간 : 2010 ∼ 2012(3개년)

○ 지원형태 : 직접수행

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 중기지방재정계획 반영(○)       ○ 투․융자 심사 이행(○)

○ 공유재산관리계획 승인(  )       ○ 용역과제 심사 이행(○)

5. 그간 추진사항

○ 도비 25%지원 확정으로 지방재정투융자심사  : ‘10. 10

○ 용역과제 심의 의뢰(시 기획예산과)          : ‘10. 11

○ 용역원가 심사 요청(전북도 예산과)          : ‘10. 11

6. ‘11년 예산소요

○ 사 업 량 : 403천㎥/일 총인(T-P) 2.0 ⇨ 0.2mg/L이하

○ 소요예산 : 4,323백만원

○ 사    유 : 예산부족으로 시비 250백만원 편성(943백만원 중)

7. 연도별 투자계획(계속)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘11년	‘12년∼	비 고
계		24,200	157	4,323	19,720
국비	국고보조	12,100	102	2,508	9,490	50%
	균특회계
	특 교 세
도 비		6,050	51	1,254	4,745	25%
시 비		5,142	4	250	4,888	25%
기 금		908	-	311	597

하수관거 BTL사업 시설 임대료(277쪽)

(하수과, 정훈, 220-7793)

1. 사업목적 및 필요성

○ 새만금 상류지역의 하천수질을 조기에 개선하여 만경강 생태계를 복원,

성공적인 새만금사업 추진에 기여하고

○ BTL(Build-Transfer-Lease 건설-양도-임대)사업은 임대형민자사업 으로 민간의 자본과 기술을 도입하여 조기에 하수관거시설을 정비, 경제적이고 효율적인 운영관리를 통해 지하수․방류수역의 오염방지와 하수처리장 처리효율 제고 등을 도모하여 시민의 삶의 질 향상

○ 사업시행자 운영기간(20년) 동안 시설임대료 지급

2. 사업근거 및 추진경위

○ 사업근거 : 사회기반시설에 대한 민간투자법․시행령, 민간투자사업기본계획

○ 하수관거BTL사업 협약(환경부, 전주시, 환경관리공단) ---------- ‘05.05.

○ 하수관거BTL사업 실시협약(전주시. 환경관리공단, 사업시행자) --- ‘06.03.

3. 사 업 개 요

○ 위       치 : 덕진구 송천동 외 10개동(덕진, 아중, 중앙, 화산, 효자처리구역)

○ 사 업 규 모 : 우․오수관거정비 L=116㎞, 배수설비 8,725세대

○ 투자사업비 : 105,196백만원(민간투자비, ‘05. 6월기준 불변가격)

○ 사 업 기 간 : 2005 ∼ 2010. 5(6개년)

○ 사업시행자 : 전주아랫물길주식회사(시공자 : GS건설 외 5개사)

○ 임 대 금 액 : 240,438백만원(국비 120,219  지방비 120,219)

○ 임 대 기 간 : 2010. 6. ∼ 2030. 5. (20년)

4. 그간 추진사항

○ 실시계획승인 및 공사 착공 ------------------------------- ’06.04.

○ 사업완료               ---------------------------------- ‘10.05.

5. ‘11년 예산소요

○ 임대료 지급 : ‘11. 3. ～ ’11. 12.(분기별 지급)

○ 소 요 예 산 : 12,022백만원(확보액 7,937) - 하특 예산부족으로 부족분 추경 확보

○ 사       유 : 민간투자법에 의한 완료사업으로 20년동안 시설임대료 지급

7. 연도별 투자계획(계속)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘11년	‘12년∼	비 고
계		240,438	6,559	7,937	225,942
국비	국고보조	120,219	3,416	5,562	111,241
	균특회계
	특 교 세
시 비		108,198	3,143	1,729	103,326
도 비		12,021		646	11,375

합류식하수도 월류수(CSOs)처리시설 설치(277쪽)

(하수과, 박춘성, 220-7796)

1. 사업목적 및 필요성

○ 새만금 상류지역의 비점 오염원에서 발생한 초기우수의 수질 오염을

근원적으로 차단하여 새만금 유역 수질개선

2. 사업근거 및 추진경위

○ 사업근거 : 하수도법 제11조(공공하수도 설치)

○ 협약체결(환경부, 전북도, 4개시군, 환경관리공단) :	‘09. 8

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 전주하수처리장, 전주천 및 삼천 일원

○ 사업규모 : 저류조 2개소(95천㎥), 간이처리시설 2개소

○ 총사업비 : 697억원 (국비 349, 도비 160, 시비 189)

○ 사업기간 : 2009년 ∼ 2013년(5개년)

○ 지원형태 : 민간대행사업(한국환경공단)

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 중기지방재정계획 반영(○)       ○ 투․융자 심사 이행(○)

○ 공유재산관리계획 승인(  )       ○ 용역과제 심사 이행(  )

5. 그간 추진사항

○ 종합계획수립 및 타당성조사 용역완료     : ‘10. 02

○ 기본계획 및 입찰안내서 용역 완료        : ‘10. 07

○ 시설공사 입찰공고                       : ‘10. 08 ∼ 11

6. ‘11년 예산소요

○ 사 업 량 : 저류조 2개소(95천㎥), 간이처리시설 2개소

○ 소요예산 : 4,765백만원

○ 사    유 : ‘11년 국고보조금 내시에 따른 예산편성(시비 미반영)

7. 연도별 투자계획(계속)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘11년	‘12년∼	비 고
계		69,700	898	4,765	64,037
국비	국고보조	34,850	561	2,688	31,601	50%
	균특회계
	특 교 세
도 비		16,031	56	1,237	14,738	23%
시 비		15,996	281		15,715	27%
기 금		2,823		840	1,983