제276회 전주시의회 임시회

복  지  환  경  위  원  회

2011년도

주요업무계획

맑 은 물 사 업 소

보  고  순  서

□	일 반 현 황		----	1
□	부 서 별 주 요 기 능		----	2
□	기 본 현 황		----	3
□	주 요 업 무 추 진 계 획		----	8
	○	수 도 행 정 과	----	9
	○	급 수 과	----	12
	○	수 질 관 리 과	----	21
	○	하 수 과	----	26

일  반  현  황

□ 기   구 : 4과 13담당(1전산실, 1시험소, 1센터, 17사업장)

																																																								맑은물 사업소
			수도행정과																																					급 수 과																																	수질관리과																				하 수 과
	수도행정							요금							체납징수																						맑은물공급										급수시설											누수방지					계량기관리											수질관리					수질분석						생산관리								하수행정			하 수 시설			하수정비
	전산실							누 수 신고 센 터						계량기시험소								방수리취수장			삼천취수장								원당취수장				전미취수장									상관취수장																							인후배수지		천마배수지			효자배수지			완산배수지		송천배수지				서신배수지					금암배수지			화산배수지				대성정수장	지곡정수장		상관정수장	팔복정수장

□ 정‧현원

부 서 직 급		정 원	현 원
			계	수도행정과	급 수 과	수질관리과	하 수 과
합 계		96	93	24	27	30	12
일반직	소 계	55	54	11	16	15	12
	4급	1	1	1
	5급	4	4	1	1	1	1
	6급	13	12	3	4	2	3
	7급	23	29	5	5	12	7
	8~9급	15	8	1	6	-	1
연 구 사		4	3	-	-	3	-
기 능 직		36	36	13	11	12	-

※ 청경 14명,  공무직 20명

부서별 주요기능

과 별	분 장 사 무	비 고
수도행정과	• 맑은물사업소 운영 총괄 • 상수도공기업특별회계 운영 • 공사 및 용역계약, 물품관리 • 상수도사용료 과징업무 전반 • 상수도요금 인상 및 조례 개정 • 검침업무 관리 • 상․하수도급수전 관리 및 수도 단속
급 수 과	• 상수도 전면개량을 통한 맑은물 공급사업 • 상수도 중장기계획 수립․시행 • 비상급수계획 및 대책수립 총괄 • 급수공사, 상수도 증설 및 확장공사 • 간이상수도 유지관리업무 • 누수탐사 및 누수복구업무 및 누수방지대책 수립 • 누수신고센터 운영관리 • 급수중지․개전․폐전에 따른 계량기 관리 • 고장․노후계량기 교체관리 • 계량기시험소 운영관리
수질관리과	• 생활용수 수요에 따른 정․원수 확보 • 광역상수도 수급에 관한 업무 전반 • 취․정수장 배수지 등 사업장 시설 유지관리 • 먹는 물 공동시설(지정약수터) 수질검사 • 사업장 시설물 유지관리 • 국가공인 수질검사기관 운영관리 • 공업용수 공급 및 유지보수
하 수 과	• 하수도공기업특별회계 운영 • 하수도사용료 조정 및 징수관리 • 금강수계관리기금 업무 • 하수관거 정비사업 • 하수관거정비 민간투자(BTL)사업 • 마을하수도 시설 및 유지관리 • 하수처리장 운영관리 및 시설물 유지관리 • 하수도 기본계획 수립

기  본  현  황

□ 급수 인구

총인구	급수인구	보급율 (%)	1일 1인 급수량(ℓ)	급수전	유수율(%)	무수율(%)	비고
639,922명	636,010명	99.4	398	203,538	62.0	38.0

□ 수계별 생산 및 급수구역

구 분			시설용량 (천㎥/일)	급수량 (천㎥/일)	급 수 지 역	급수인구	비율 (%)
총 계			328	295		636,010	100
생활용수	합 계		258	255	33개동	636,010	100
	자체상수도	대 성	40	35	동․서서학, 중화산1, 완산, 효자1일부, 삼천1일부, 평화1.2일부	82,681	13
	광역상수도	전주권	218	220	중앙,풍남,노송, 서신, 삼천1일부. 2. 3, 중화2, 평화1.2일부, 효자1일부.2. 3. 4, 진북, 인후1.2.3, 금암1.2, 덕진, 우아1.2, 호성, 팔복, 송천1.2, 조촌, 동산.	553,329	87
공업 용수	팔복정수장		70	40	팔복동 1, 2공단(18개 업체 공급)

※ 생활용수 급수구역은 생산량 및 수요량에 따라 조절

□ 도․송․배․급수관

〔단위 : ㎞〕

총 연 장	도․송수관	배 수 관	급 수 관	비 고
2,179	57	711	1,411

□ 상수원 보호구역

상수도사업장	보 호 구 역			구역지정일	보호시설
	면적(㎢)	상류(Km)	하류(Km)		안내판	표주
계	27.657				42	132
방수리취수장	0.285	1.0	0.5	72. 5. 5.	7	24
상관수원지	26.655	전유역		24. 6. 9.	10	26
삼천취수장	0.284	2.2 (독배천0.7)	0.3	82. 6.19.	11	42
원당양수장	0.104	1.0	0.1	80. 8. 4.	6	16
전미취수장	0.329	0.5	0.3	67. 8. 5.	8	24

□ 상수원 수계별 『댐』 저수량

수 원	위 치	만수량(천㎥)	관리기관	비 고
계		817,139
상 관 제	완 주 군	2,139	전 주 시	대성수계보충
용 담 댐	진 안 군	815,000	수자원공사	전주권광역

□ 하 수 도

구 분		처리구역 (㎢)	계획연장 (㎞)	시설연장 (㎞)	미시설연장 (㎞)	보급율 (%)	비고
계		54.97	2,393	1,674	719	96
합 류 식			566	566	0	100.0
분류식	소 계	54.97	1,826	1,108	718	60.7
	오수관거	-	902	646	256
	우수관거	-	924	462	462

□ 차집관로

하 천 명	연 장 (㎞)	맨 홀 (개)	우수토실 (개소)	환기구 (개소)	여수토실 (개소)
계 (6개노선)	88.9	1,010	251	73	5
전주천 (좌, 우안)	23.5	369	142	37	4
삼 천 (좌, 우안)	15.4	155	45	18
금암천 (좌, 우안)	4.4	82	38	9
아 중 선	12.0	174	16	4
팔복선(공장,생활)	16.9	183	8	5	1
상 관 라 인	10.4	47	2
기 타	6.3

□ 하수․위생처리 시설

구 분	하 수 처 리	위 생 처 리
위 치	덕진구 송천동 2가 1035번지
시설용량	1일 처리능력 ⇨ 403,000㎥ - 1단계 시설 : 113,000㎥ - 2단계 시설 : 190,000㎥ - 3단계 시설 : 100,000㎥	1일 처리능력 ⇨ 290㎘ - 분 뇨 : 30㎘ - 정 화 조 : 260㎘
처리방법	1․2단계 고도처리(CNR)공법 3단계 고도처리(CSBR) 공법	하수 연계처리(1994년부터 시행)

□ 2011년 상수도 공기업 예산

총 규 모 : 57,037백만원

〔단위 : 백만원〕

세 입				세 출
계 : 57,037(100%)				계 : 57,037(100%)
▣ 상수도사업수익 : 54,463(95.5%)				▣ 상수도사업비용 : 46,748(82.0%)
◦ 영업수익 : ․ 급 수 수 익 : ․ 급수공사수익 : ․ 기타영업수익 : ◦ 영업외수익 : ․ 예금수입이자 : ․ 타회계전입금 : ․ 기타영업외수익 :	53,314 50,400 2,519 395 1,149 420 516 213			◦ 인력운영비 : ◦ 운 영 경 비 : ◦ 경 상 이 전 : ◦ 급수 공사비 : ◦ 지급이자 :	6,193 34,154 2,430 2,051 1,920
▣ 자 본 적 수 익 : 574(1.0%)				▣ 자본적 지출 : 10,289(18.0%)
◦ 자본잉여금수익 :	574			◦ 자본투자비 :	5,600
				◦ 부채상환금 :	3,969
				◦ 기타자본적지출 :	150
▣ 예산외 계정 : 2,000(3.5%) (과년도계정)				◦ 예 비 비 :	570

□ 2011년 하수도 공기업 예산

총 규 모 : 44,689백만원

〔단위 : 백만원〕

세 입			세 출
계 : 44,689(100%)			계 : 44,689(100%)
▣ 하수도사업수익 : 17,850(39.9%)			▣ 하수도사업비용 : 9,974(22.3%)
◦ 영 업 수 익 : 16,578			◦ 영 업 비 용 : 9,680
. 하수도사용료수익 : . 기타영업수익 :	16,339 239		. 인력운영비 등	1,524
			. 운영경비 등	414
◦ 영업외 수익 : 1,272
			. 민간위탁대행사업비			7,742
. 수 입 이 자 : . 타회계전입금수익 :	236 1,036		◦ 영업외 비용 : 174
			◦ 특별손실 : 20
			◦ 예 비 비 : 100
▣ 자본적 수익 : 26,599(59.5%)			▣ 자본적 지출 : 34,715(77.7%)
◦ 자본잉여금수익:	26,599		◦ 가동설비자산 :		16,334
․ 타회계건설보조금:	24,099
			◦ 비가동설비자산 :		4,758
․ 공 사 부 담 금 :	2,500		◦ 고정부채상환금 :		710
▣ 예 산 외 계 정 : 240(0.6%) (과년도계정)			◦ 민간자본이전 :		12,703
			◦ 예 비 비 :		210

부서별 주요업무 추진 계획

수도행정과  소관

급 수 과  소관

수질관리과  소관

하 수 과  소관

수 도 행 정 과  소 관

ꊱ	-상하수도 사용료- 「고지․납부방법」다양화로 민원서비스향상	--	10
ꊲ	-안정재정 확충 실현을 위한- 체납 상수도사용료 징수율 제고	--	11

- 상․하수도 사용료 -

『고지․납부방법 다양화』로 민원서비스향상

○ 상․하수도 사용료에 대한 납부 및 고지방법을 다양하게 실시하여

납부편의를 도모하고 맞춤형 행정서비스 제공

□ 현   황

○ OCR 고지서 납부 : 시중은행,제2금융권등 납부가능

○ 가상계좌 납부     : 전북은행, 농협

○ 인터넷 전자납부   : 공과금수납기(CD/ATM기)에서 납부가능

⇨ 가상계좌․인터넷전자납부 시 실시간 납부조회 가능

○ 자동이체 신청 납부 시 상수도요금의 1% 할인(5,000원 한도)

□ 추진계획

○ 요금 납부 및 고지 방법 확대운영

구 분	현 행	확 대
납부방법	∙ 가상계좌 납부 ∙ 인터넷 전자 납부 ∙ 자동이체 및 은행 납부	신용카드 납부제 도입
고지방법	∙ 고지서(OCR)발행 (정기분,체납분,자동납부)	이메일고지 추가

□ 금후계획

○ 신용카드결재 및 이메일고지 시스템 수도프로그램 연계구축 : ’11. 상반기중

○ 신용카드납부제 및 이메일고지 서비스 시행        : ’11. 상반기중

○ 더욱 쉽고 다양한 요금 납부방법 및 이메일고지등 지속적으로 적극 홍보  : 년중

- 안정재정 확충 실현을 위한 -

체납 상수도사용료 징수율 제고

□ 현   황

○ 2010. 12. 31기준                         (단위 : 천건 /백만원)

구분 년도	조 정 액		징 수 액		체 납 액		징수율 (%)	비고
	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액
계	2,606	57,225	2,424	54,349	182	2,876	95.0
현년도	2,419	53,917	2,298	51,974	121	1,943	96.4
과년도	187	3,308	126	2,375	61	933	71.7

□ 2011년도 징수목표

○ 현년도 : 97.0％(2010년 징수율 : 96.4%)

○ 과년도 : 72.0％(2010년 징수율 : 71.7%)

□ 그간 추진상황

○ 특별징수기간 운영 : 매 분기별 운영

○ 상수도 사용료 체납자 납부 독려

- 고액․고질 체납자 계고장 교부        : 16,966명 4,329백만원

- 체납자의 건물주 재산압류 예고문 발송 :    530명   625백만원

- 고액 및 고질 체납수용가 행정조치

․ 급수중지 456개소, 187백만원(개전 400개소, 162백만원)

○ 무재산,행불,소멸시효등 결손            : 28,791건  301백만원

○ 고액체납자 재산압류                   :     219건  106백만원

□ 문제점 및 대책

○ 다중 집합건물 입주자와 생계형 영세상인 등 다수민원 발생

○ 경기침체로 인한 휴ㆍ폐업, 실직자 증가, 부도등으로 체납액 증가

⇨ 고액체납자, 영세상인 등 분납 유도 납부 징수

□ 금후계획

○ 체납자에 대한 유형별 분석 후 지속적 계고장 발송 및 전화독려

○ 고액ㆍ고질체납자에 대한 재산압류 및 단수등 강력한 행정 조치

○ 상습고액체납자에 대한 특별징수반 편성 : 호별방문등 집중 독려

급  수  과  소 관

ꊱ	「상수도 전면개량을 통한」맑은물 공급사업	--	13
ꊲ	팔복배수지 건설 및 혁신도시 배수관 포설	--	14
	고지대 급수난 해소 사업(지곡배수지 건설)	--	16
	소규모 배수관 시설 사업	--	17
	긴급누수 복구 및 누수탐사	--	18
ꊶ	학교등 급수설비 개선 지원 사업	--	19
	신속하고 완벽한 상수도 계량기관리	--	20

「상수도 전면개량을 통한」맑은물 공급사업

○ 2014년까지 유수율 85%이상 향상 및 선진화된 급수체계 구축으로

맑고 깨끗한 수돗물을 시민들에게 공급하고자 함

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 전 급수구역 일원

○ 사업규모

- 블록안정화 128개블록, 노후․불용관 전면개량 50개블록

- 통합관리센터 신축(서신배수지내) 및 전산시스템 구축 1식

- 상수도관 매설 703㎞(송․배수관로 279, 급수관로 424)등

○ 총사업비 : 1,436억원(시비 1,036, 융자금 400)

○ 사업기간 : 2009. 3월 ～ 2014. 3월(5개년)

□ 그간 추진상황

○ 공 사 착 공  ----------------------------------  ’09.  3. 24

○ 1차분 준공  ---------------------------------  ’10.  7. 23

○ 2차분 준공  ---------------------------------  ’10. 12. 28

○ 사업설명회 개최(통장, 일반시민등 1,200여명)  ---  ’09. 3월 ～ ’10. 12월

․공사 추진상황 : 전체 공정 24.0%

- 상수도관 매설 : 45개지역 166㎞ 매설완료

- 통합관리센터 신축(건축물) 완료, 배수지 개량 사업 추진 중

□ 금후계획

○ 2011년 총사업비 245억원(지방채200, 시비45) 추진

- 3차분(사업량 69km, 사업비 118억원) : ’10. 12 ~ ’12. 04

- 4차분(사업량 74km, 사업비 127억원) : ’11. 07 ~ ’12. 09

○ 시민홍보(주민설명회 등) 지속 실시  -------------  준공시까지

○ 전체분 준공  -----------------------------------   ’14.  3월

팔복배수지 건설 및 혁신도시 배수관 포설

○ 기존 송수관에서 직접 공급되는 조촌, 팔복, 동산동 지역에 간접  배수방식으로 공급하고,

○ 국가의 지역균형 발전계획에 따른 혁신도시, 법조타운, 장동, 유통단지

및 첨단산업단지 등의 생활용수를 안정적으로 공급하고자 함

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 팔복동･만성동 일원

○ 사업규모

- 배수지 34,500㎥/일(생활용수 30,000㎥, 공업용수 4,500㎥)

- 송․배수관 매설 L=11.4㎞(송수관 5.4㎞, 배수관 6㎞)

○ 총사업비 : 26,305백만원(시비 14,715, 국비 9,315, LH공사 2,275)

- 기투자 16,124백만원, 2011년 3,803(국비 3,290, 시비 513)

- 미확보액 : 6,378백만원(시비 4,103, LH만성복합단지 2,275)

○ 사업기간 : 2009. 9월 ～ 2012. 9월(4개년)

□ 그간 추진상황

[팔복배수지 건설] : 공정률 20%

○ 팔복배수지 건설 설계용역 추진  ----------  ’09. 9. ~ ’10. 1.

○ 팔복배수지 건설사업 추진  ---------------  ’10. 6. ~ ’12. 6.

- 송ㆍ배수관 매설 (L=3.9km중 1.4km완료, D=900㎜), 배수지 진입도로 토공

[혁신도시 배수관 포설] : 공정률 40%

○ 혁신도시 배수관 포설 추진  --------------  ’09. 9. ~ ’12. 9.

- 배수관 포설(L=7.5km중 2.7km완료, D=350～500㎜)

□ 문 제 점

○ 공공기관 입주 및 농진청 공업용수 공급요청 등으로 혁신도시 사업

기간 단축요청(당초 2012년 하반기 ⇒ 2012년 상반기)이 있으나

우리시의 재정 형편상 잔여사업비(4,103백만원) 확보 지난

○ LH공사 만성복합단지 대로 1-16호선 개설 지연 시 2012년 혁신도시  상수도 공급 차질 우려

○ LH공사 사업유보로 LH공사 부담금 2,275백만원 확보시기 불투명

□ 대    책

○ 시비확보 어려움으로 배수지 공사 지연시 송수관로에서 직접 연결하여       혁신도시 생활․공업용수 우선 공급하여 혁신도시 차질 없도록 조치 가능

○ 만성복합단지 LH사업계획에 1-16호선 도로개설이 우선반영 될 수

있도록 지속 설득

□ 금후계획

○ 혁신도시 및 팔복배수지 송배수관 매설    : ’11. 3. ～ ’11. 12.

○ 팔복배수지 건설추진                     : ’11. 3. ～ ’12. 09.

○ 혁신도시 및 팔복배수지 전체사업 준공    : ’12. 10.

고지대 급수난 해소 사업(지곡배수지 건설)

○ 대성정수장 취수원인 임실오원천 주기적 물 분쟁 등 대성정수장     취수원 불안정으로 취수 중단시 평화동, 서서학동 고지대 지역의     급수불출 해소하고 배수지 건설로 안정적 용수공급 기여하고자함

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 완산구 평화동 2가 산104-4번지 일원

○ 사업규모 : 배수지 건설 V=15,000㎥, 가압장 신설 Q=30,000㎥/일

○ 총사업비 : 13,500백만원(공사 12,000 설계 550, 감리 및 기타 950)

- 2011년 확보예산 : 550백만원(기본 및 실시설계용역비)

○ 사업기간 : 2011. ~ 2013.(3개년)

○ 급수구역 : 평화동, 서서학동, 삼천3동 50,000여 세대

□ 그간 추진사항

○ 송수관로 매설 및 세관갱생  --------------------   ’05 ~ ’06

- 우림교~삼천취수장간 관로매설 L=2.9km, D=600mm , 사업비 2,827백만원

- 삼천취수장~지곡정수장간 세관갱생 L=2.6km D=600mm , 사업비 860백만원

○ 중기지방재정계획 수립  --------------------------   ’10.  8.

○ 기본 및 실시설계 용역과제 심의  ------------------  ’10. 11.

□ 추진계획

○ 2011년 추진 계획

- 기본 및 실시설계용역 발주  ----------------------  ’11.  2.

- 기본 및 실시설계용역 추진  ------------  ’11. 4 ~ ’11. 10.

○ 지곡배수지 건설  -----------------------  ’12. 3 ~ ’13. 11.

소규모 배수관 시설 사업

○ 취락지역과 멀리 동떨어져 있어 상수도 공급혜택을 받지 못하고      지하수나 간이상수도를 음용수로 사용하고 있는 소규모 미급수지역에     상수도를 공급하여 행정신뢰도 제고 및 시민보건위생 개선

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 일원

○ 사업규모 : 관로매설 L=2.5km, D=16~100mm

○ 총사업비 : 200백만원

○ 사업기간 : 2011. 3월 ~ 11월

□ 그간 추진사항

○ 사 업 량 : 배수관 포설 151.2km, 가압장 11개소

○ 사 업 비 : 17,254백만원(일반회계 6,870, 특별회계 10,384)

○ 수혜가구 : 127개마을 4,194세대(16,516여명)

【2010년 추진상황】

․사 업 량 : 대성동 사대마을등 3개마을외 소규모 미급수지역 L=6.3km

․사 업 비 : 646백만원(수혜가구 83세대)

□ 추진계획

○ 소규모 미급수지역 전수조사  -------------  ’10. 12. ~ ’11. 2.

- 인    원 : 2개팀 4명(급수시설담당 외 3명)

- 조사대상 : 전주시 일원

- 조사방법 : 사전 전산(상수도관리시스템) 조사후 현지출장 조사

- 결과활용 : 대상지역 우선순위 결정 후 연차적 배수관 포설공사추진

○ 2011년 배수관 포설사업 추진  ----------  ’11. 3. ~ ’11. 11.

긴급누수복구 및 누수탐사

○ 상수도 시설물에서 발생하는 돌발적인 누수를 효율적으로 긴급 복구     함으로써 누수로 인한 예산낭비 억제 및 시민불편 해소

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 전 급수구역 일원(맑은물공급 사업구간 제외)

○ 사업규모 : 누수 복구공사 400개소(긴급누수복구 370, 누수탐사 30)

○ 총사업비 : 400백만원(긴급누수복구 370, 누수탐사 30)

○ 사업기간 : 2011. 3월 ~ 12월

□ 그간 추진상황

○ 2010년도 누수민원처리 : 3,232개소

- 도급처리(도로누수) : 590개소 / 497백만원

- 자체처리 : 2,642개소(누수수리원 10명)

○ 누수탐사용역 추진 : 90개소 / 40백만원

□ 금후계획

○ 긴급누수복구 추진   --------------------   ’11.  3월 ~ 12월

- 사 업 비 : 370백만원

- 사 업 량 : 370개소 정도

○ 용역(누수탐사) 추진   ------------------   ’11.  2월 ~ 11월

- 용 역 비 : 30백만원(누수발견 시 복구비용은 긴급누수 사업비 활용)

- 사 업 량 : 30개소 정도

학교 등 급수설비 개선 지원 사업

○ 시민에게 맑고 깨끗한 양질의 수돗물을 공급하기 위하여 노후된      옥내급수관 개량에 필요한 공사비 일부 지원

□ 사업개요

○ 지원범위 : 배관의 내부가 부식되어 수질기준을 초과하는 경우

○ 지원대상 : 학교, 주거용건물, 사회복지시설, 수급자 주택 등

○ 지원근거 : 전주시 상수도 급수조례 제 39조(급수설비의 관리 책임 등)

○ 지원범위

- 학      교 : 공사비의 70%이하(최대 20백만원)

- 공 동 주 택 : 100세대미만(10백만원), 200세대미만(20백만원), 200세대이상(30백만원)

- 기초수급자 : 전액지원(최대 2백만원)

- 단 독 주 택 : 세대당 최대 30만원 이하(연면적 85㎡이하)

□ 추진상황

○ 2009년 지원 : 3개소(학교 1, 공동주택 2) / 50백만원

○ 2010년 지원 : 7개소 / 118백만원

- 상반기 : 4개소(공동주택 4) / 74백만원

- 하반기 : 3개소(공동주택 3) / 44백만원

□ 금후계획

○ 2011년도 사업비 :  150백만원

○ 학교 등 급수설비 개량 지원 사업 홍보(홈페이지, 일간지 등)  --  ’11. 02.

○ 상․하반기 사업 시행  ----------------------  ’11. 03 ~ 12.

신속하고 완벽한 상수도 계량기관리

○ 유효만기 계량기의 완벽한 교체를 통해 정확한 사용량을 측정하고

계량기 고장 및 동파의 사전 예방조치 강화로 시민불편을 최소화함

□ 사업개요

○ 사업규모 : 계량기 교체 20,000개

※ 수도전수 : 203,538전

○ 총사업비 : 340백만원

○ 사업기간 : 2011. 1월 ~ 12월

□ 금후계획

○ 유효만기 계량기 교체

- 대    상 : 18,500개(50㎜이하 18,488, 50㎜초과 12)

※ 유효기간 : 50㎜이하 8년, 50㎜초과 6년

- 추진내용 : 직접교체(7,000개), 맑은물 공급사업(9,000개),

상수도 대행업체 교체(2,500개)

○ 고장 및 동파계량기 교체

- 대    상 : 1,500개

- 추진내용 : 긴급복구반 연중(무휴) 운영(공휴일 1개반 2명근무),

○ 소량사용 계량기 중점관리

- 대    상 : 사용량이 전월 대비 현저히 줄어든 수용가

- 추진방법 : 계량기 성능시험을 통한 불량계량기 색출 교체

○ 상습동파 세대 집중관리

- 대    상 : 250세대(최근 5년내 2회 이상 동파발생)

- 관리방법 : 동절기 사전보온 조치(보온재 충전 및 동파방지 비닐설치)

안내문자 발송 등

수 질 관 리 과  소 관

ꊱ	사회복지시설․저소득층 음용수 수질관리	--	22
ꊲ	배수지 내부 개량으로 맑은물 공급추진	--	23
ꊳ	깨끗하고 맛있는 수돗물 품질관리 및 안전성 검증	--	24
ꊴ	전국 최우수 수질검사기관 ․ 정수장 위상 강화	--	25

사회복지시설․저소득층 음용수 수질관리

○ 소외계층의 음용실태를 정확히 파악하고 무료 수질검사를 실시, 부적절

음용사례를 개선하고『먹는 물 돌보미』역할로 사회적 약자의 건강을

지킬 수 있도록 지원하고자 함

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2011. 01～ 2011. 12(※1년시행 후 지속추진 여부 판단)

○ 사업시행 대상(※영유아 보육시설 무료 수질검사제는 지속 시행)

- 사회복지시설 65개소

계	보육원	양로시설	요양원	재가노인 복지시설	노 인 복지회관
65	4	2	39	14	6

- 사회 저소득층 : 국민기초생활 수급자, 다문화가정 등 주민센터 자료 활용

○ 수질검사

- 항목 및 수수료 : 일반세균 등 먹는 물 수질기준 17개항목 (79,700원/건 면제)

□ 추진계획

○ 사회복지시설 및 주민센터에 대한 충분한 사전 홍보 실시

○『수돗물 이동상담반』2인1조 편성, 시설 및 저소득층을 방문하여

먹는 물에 관한 상담 및 시료 직접 채수

- 사회복지시설에서 사용하는 정수기수 및 수도꼭지수 등

○ 수질검사결과 통보 및 안전하게 음용하는 방법 등 안내

□ 금후계획

○ 매월 영유아 보육시설 시료 채수시  6~8개 사회복지시설을 방문,

음용수 병행 수질측정 및 적정 음용 개선 권고

- 수질검사 결과 부적합시설에 대한 사후 먹는물 관리(지도) 시행

※ 수돗물 음용권고 및 정수기 관리실태 재점검, 관리요령 등 교육

배수지 내부 개량으로 맑은물 공급추진

광역상수도 배수지(3개소) 내부 콘크리트 부식으로 누수 및 정수생산 이후 급수과정에서 2차 수질오염이 우려 ‘09년부터 시행하고 있는 노후시설 교체 및 개량사업의 지속 추진

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2009. 1. ~ 2012. 12. 31(년차사업)

○ 사 업 명 : 인후, 천마, 효자배수지 내부개량(도장방수) 공사

○ 사업개요 : 인후배수지 4지(14,454㎡), 천마배수지 4지(14,700㎡)

효자배수지 2지(7,350㎡)

○ 사 업 비 : 2,279백만원(기투자 787백만원, 이후투자 1,492백만원)

□ 그간 추진상황

○ 인후배수지 내부 개량공사 완료(‘09 ~ ‘10, 787백만원)

- 배수지 4지 내부 세라믹수지 코팅 및 노후밸브 교체 등

□ 문제점 및 대책

○ 천마, 효자배수지에서 동일현상 발생

- 염소의 영향으로 인한 내부콘크리트 부식 가속화

- 시설물 노후화로 구조물 내구성 저하

⇒ ‘11년도 천마배수지(총 4지) 추진계획

□ 금후계획

○ 천마배수지 2지(7,350㎡, 496백만원)  --  2011. 1. ~ 5. 31

※ 잔여 2지(7,350㎡, 496백만원) ‘11년 추경 확보 후 추진

○ 효자배수지 2지(7,350㎡, 500백만원)  ---  2012. 1 ~ 5. 31

깨끗하고 맛있는 수돗물 품질관리 및 안전성 검증

○ 과학적 생산 공급 및 첨단 분석체제로 선진국 수준의 철저한 수질

관리를 통하여 안전한 수돗물 공급

○ 소비자와의 소통 및 품질검증을 통한 수돗물의 상호 신뢰성 향상

□ 사업개요

○ 법적 규정보다 강화한 수질관리 및 검사 체제를 목표 설정․추진

- 수질검사(항목) 확대 : 정수 57개 ⇒ 95개 항목

○ 수돗물의 신뢰성 향상를 위한 다양한 시책사업 지속 발굴, 추진

- 수돗물평가 소비자 모니터링, 수돗물 품질인증제, 민관합동 수질조사

- 수돗물의 안전성을 직접 확인할 수 있는 체험형 이벤트 개발 등

□ 추진상황

○ 시민의 수도행정 평가 및 제안 수렴을 위한 소비자 모니터링 운영

- 모니터 요원 200명으로 확대 구성하여 적극적인 활동 전개

○『도내최초』수돗물 품질인증제 추진(‘07년도부터 총 4,925세대)

- 찾아가는 수질검사 서비스등 수질개선과 수돗물 품질향상 주력

○ 수돗물의 생산․공급과정 및 수질상태를 담은 『수돗물품질보고서』배부 : 20만부

○ 수돗물 생산시설 견학 및 현장체험 : 52단체 3,600명(‘10년도)

○ 수돗물평가위원회 개최(분기) 및 민관합동 수질조사(4회) 실시

□ 금후계획

○ 첨단시스템을 활용한 과학적인 수처리 공정의 효율적인 운영

- 적정 약품투입으로 깨끗하고 맛있는 수돗물 공급

○ 규정보다 강화한 수질검사로 철저한 검증을 거친 안전한 수돗물 생산

- 정수탁도등 먹는 물 수질기준의 1/2수준까지 낮춰 생산 공급

- 상수원 조류지표인 지오즈민, 2-MIB 등 이․취미 유발물질 관리강화

○ 수돗물의 안전성, 우수성 홍보 및 소비자모니터링 활성화를 통하여 민관 소통행정의 신뢰성 확보

전국 최우수 수질검사기관․정수장 위상 강화

○ 환경부 평가 “3년 연속 전국 최상위 수질검사기관” 위상 지속적 유지

○ 선진 운영시스템 확충으로 전국 정수장 운영능력 평가에서 최우수정수장    평가를 취득, 대시민 신뢰도 제고 및 우리 시 수도공무원의 자부심 고취

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2010. 9 ~ 2011(※이후 목표 강화설정 지속 추진계획)

○ 사업내용(목표성과)

- ‘11년도 환경부 공인검사기관․ 정수장 평가 우수한 성적 거양

- 검사기관을 활용한 다양한 시책 추진으로 수돗물 신뢰도 향상에 기여

	공인수질검사기관 운영현황
․ 국립환경과학원『먹는물 수질검사기관 제33호』지정 - ‘00.7.25 ․ 검 사 범 위 : 모든 먹는물, 상수원수, 먹는샘물, 각종 지하수 등 ․ 수수료 수입 : ‘00년 ~ ‘10년 3,385백만원(연평균 3억원정도)

□ 그간 추진상황

○ ‘08~’10 국립환경과학원 평가결과 ‘3년 연속 최상위 기관’ 선정

○ 환경부 전국 정수장평가 ‘2008년도 최우수 정수장’ 선정

⇨ 수돗물의 신뢰성 제고 기여 및 타 시 ․ 군 업무연찬(수처리공정)지원

○ 도내 최초 품질인증제, 지하수 음용가구 및 보육시설 무료 수질검사 시행

□ 금후계획

○ 수질검사 유치 강화 : 공격적 마케팅 및 “고객중심”운영 중점추진

- 시료 직접수거, 검사결과 휴대전화 문자전송 등 고객편의성을 주안

- 먹는물 관리 상담, 검사기일 단축(1/2), 분석결과의 정확성 등 부각

○ 정수장 선진화 완성 : 완벽한 수처리공정(시설) 구축 및 노후환경 개선

하  수  과   소 관

ꊱ	하수처리 편입구역 하수관거사업	--	27
ꊲ	중앙처리구역 하수관거 정비사업	--	28
ꊳ	효자처리구역 하수관거 정비사업	--	29
ꊴ	합류식 하수도 초기우수(CSOs)처리시설 사업	--	30
ꊵ	전주하수처리장 총인처리시설 설치사업	--	31
ꊶ	매암지구 마을하수도 정비사업	--	32

하수처리 편입구역 하수관거사업

○ 전주․삼천 상류지역의 생활하수를 차집 하수처리장에 유입

○ 공공수역 수질오염 방지로 쾌적한 하천 수변 공간제공

○ 농촌동 마을하수도 개량으로 시민 보건위생 증진

□ 사업개요

○ 위    치 : 평화동 장교마을 등 48개 마을

○ 사업규모 : 관거신설 L=76.4㎞, 배수설비 2,045개소(5,300세대)

○ 사 업 비 : 39,844백만원(국비 19,790, 지방비 20,054)

- 기투자 12,295백만원, 2011년 7,666백만원(국 4,183, 기금 671, 시 2,812)

○ 사업기간 : 2007 ～ 2012(6개년)

□ 그간 추진상황

○ 지방재정 투융자심사 완료(행정자치부)  ----------   2007. 10

○ 실시설계용역 및 행정절차 이행  -----  2007. 06 ~ 2008. 08

○ 4개지구(중복․전주천,평화,중인,박물관지구) 공사착공  --  2008. 10

- 전체 L=76.4㎞ 중 L=18.2㎞ 완료(전체 공정: 30%)

- 완료구간 : 색장동 은석마을 외 9,  삼천교 ～교도소,

세내교～ 중인교, 박물관 주변(중복천)일부지역 완료

□ 금후계획

○ 4개지구 년차별 사업추진  ------------------   2011 ~ 2012

- 2011년 하수관거 L=14.0㎞ 시행

중앙처리구역 하수관거 정비사업

○ 노송천 자연형하천 복원사업 상류 오염원 차단으로 시민에게

생명력 있는 수변공간 제공

○ 하천수, 지하수, 우수등 불명수 감소로 하수처리비 절감

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 중앙, 풍남, 노송동일원(노송천복원사업 상류지역)

○ 사업규모 : 관거정비 L=27.6㎞, 배수설비 3,302가구

○ 총사업비 : 30,000백만원(국비 15,000,  지방비 15,000)

- 기투자 7,097백만원, 2011년 3,545백만원(국 1,725 기금627 시 1,193)

○ 사업기간 : 2009 ～ 2012(4개년)

□ 그간 추진상황

○ 지방재정 투융자심사(전라북도)  -----------------  2008. 10.

○ 중기지방재정계획 반영  -------------------------  2008. 12.

○ 실시설계용역 완료  ----------------------  2009. 03. ～ 08.

○ 행정절차이행(재원협의, 설계자문, 일상감사등) 완료 ---  2009. 10.

○ 공사발주 및 업체선정  -------------------  2009. 11. ~ 12.

○ 공사계약 및 착공(전체공정 : 10%)  -------------  2010. 01.

- 동양@사거리 ~ 중앙시장아케이트 ~ 시청앞 대신증권간 관로매설 완료

□ 금후계획

○ 잔여구간 년차별 사업추진  ------------------  2011 ~ 2012

- 2011년 하수관거  L=5.0㎞ 시행(시청 앞 ~ 경원동 주변)

효자처리구역 하수관거 정비사업

○ 새만금 상류지역 목표수질 조기달성과 삼천 수질개선 시급

○ 하수관거 우․오수 분리와 건물 정화조 폐쇄로 시민보건 위생 향상

○ 하천수, 지하수, 우수 등 불명수 감소로 하수처리비 절감

□ 사업개요

○ 위    치 : 효자처리구역(효자동 일원), 하수처리장 주변마을 등

○ 사업규모 : 관거정비 L=25.0㎞

○ 총사업비 : 20,000백만원(국비 10,000, 지방비 10,000)

- 기투자 49백만원, 2011년 1,000백만원(국 500, 기금45, 시 455)

※ 2011년 신규 국고보조사업 반영

○ 사업기간 : 2011 ～ 2014(4개년)

□ 그간 추진상황

○ 지방재정투융자 심사 완료(전라북도)  ------------  2009. 10.

○ 용역과제 심의 완료  ----------------------------  2009. 11.

○ 계약(원가) 심사(전라북도)  ---------------------  2010. 12.

□ 금후계획

○ 실시설계용역 추진  ----------------------  2011. 01. ~ 12.

○ 공사착공 및 완료  ----------------  2012. 02. ~ 2014. 12.

합류식 하수도 초기우수(CSOs) 처리시설 사업

○ 새만금 상류지역의 비점 오염원에서 발생한 초기우수의 수질오염을

근원적으로 차단하여 새만금 유역 수질개선

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주천 및 삼천 일원

○ 사업규모 : 저류조 2개소(95천㎥), 간이처리시설 2개소

○ 사 업 비 : 697억원(국비 349, 도비 70, 시비 278)

- 현재까지 확보예산 : 49억원(국비 33, 도비 6, 시비 10)

○ 사업기간 : 2009년 ～ 2013년(5개년)

○ 사업 추진방법 : 환경부, 전북도, 전주시, 익산시, 김제시, 완주군,

한국환경공단 협약체결 추진

□ 그간 추진상황

○ 협약체결(환경부, 전북도, 4개시군, 환경관리공단)  --  2009. 08

○ 종합계획수립 및 타당성조사 용역 완료  -----------  2010. 02

○ 기본계획 및 입찰안내서 용역 완료  ---------------  2010. 07

○ 시설공사 입찰공고  -----------------------  2010. 08 ~ 12

○ 실시설계 적격자 선정 및 우선시공분 계약  --------  2010. 12

□ 문제점 및 대책

○ 전주시 지방비 부담률(50%)이 타 시군(익산, 김제 30%)에 비해

높아 재원부족으로 사업추진 지난

⇨ 국, 도비 지원률 70% 상향조정 요구(국비 50%⇒ 60%)

※ 도비(5%⇒ 10%) 기 결정, 국비 부담률(법령 개정) 조정요구

□ 금후계획

○ 실시설계 시행 및 주민설명회 개최  ----   2011. 01 ～ 2011. 03

○ 공사착공 및 완료   -----------------   2011. 04 ～ 2013. 11

- 2011년 우선시공분 추진(전주환경사업소· 저류조)

전주하수처리장 총인처리시설 설치사업

○ 새만금 상류지역은 방류수 수질기준이 2012.1.1일부터 총인(T-P)

2.0 ⇨ 0.2mg/L이하로 강화되어  “총인” 처리시설 설치 필요

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 송천동 환경사업소내

○ 사업규모 : 403천㎥/일

○ 사 업 비 : 242억원, 운영비 25억원/년

- 현재까지 확보예산 : 32억원(국비 26, 도비 0.5, 시비 5.5)

○ 사업기간 : 2010 ～ 2012년

□ 그간 추진상황

○ 새만금유역 총인처리 시설비 및 운영비 전액국비로 추진계획 수립

(국무총리실 수질개선기획단, 환경부)  -----------   2008. 12

○ 환경부에서 새만금 환경분과 대책위원회에 인처리설비 도입방안보고

(전액 국비설치)  -------------------------------  2009. 04

○ 4대강사업 총인처리 국비지원 비율과 동일하게 국비 50%, 지방비

50%로 변경  -----------------------------------  2009. 10

○ 지방재정투융자 조건부 심사(도비비율 협의후 추진)  ----  2010. 10

○ 용역과제 심의(시 기획예산과)  ------------------  2010. 11

○ 용역원가 심사(전북도 예산과)  ------------------  2010. 11

○ 기본 및 실시설계 용역발주  ----------------------  2010. 12

○ 부시장․부군수회의 시 도비비율 통보  -----------  2010. 12

※ 전북도 2011년 도비비율 20% 조정 확정

□ 금후계획

○ 기본 및 실시설계 추진  ------------  2011. 01 ~ 2011. 08

○ 공사발주(조달청)  ------------------------------  2011. 09

○ 공사착공 및 완료  -----------------  2011. 10 ~ 2012. 12

※ 운영비 일부 도비지원 및 수질기준(0.2 ⇒ 0.3mg/L)완화 요구

매암지구 마을하수도 정비사업

○ 새만금 상류지역의 하천수질을 개선하고자 농촌마을하수도 시설개량

및 우․오수 분리사업을 추진 악취발생 해소 및 주민 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 성덕동 일원(매암 외 4개마을)

○ 사업규모 : 하수처리시설 Q= 190톤, 하수관거 L= 8.7㎞

○ 사 업 비 : 5,807백만원(국비 4,065  시비 1,742)

- 현재까지 확보예산 1,805백만원(국비 1,299, 시비 506)

○ 사업기간 : 2009년 ～ 2012년(4개년)

□ 그간 추진상황

○ 실시설계용역 완료  ------------------------------   2009. 09

○ 인가 및 공사발주(조달청)  -----------------------   2009. 11

○ 공사착공(1, 2차분)   ----------------------------   2009. 12

○ 2차분 공사완료  ---------------------------------   2010. 06

○ 1차분 공사 재착수(처리장 ⇒ 관로공사 변경)  -----   2010. 08

○ 하수처리장 예정지 수용재결 신청  ----------------   2010. 10

○ 하수처리장 예정지 수용재결 결정(지토위)  --------   2010. 11

○ 하수처리장 예정지 보상 및 재협의 통보  ---------   2010. 12

○ 1차분 공사완료  --------------------------------   2010. 12

○ 3차분 공사착공  --------------------------------   2010. 12

□ 금후계획

○ 3차분 공사추진 및 완료  -------------  2011. 01 ~ 2011. 03

○ 토지공탁 및 4차분 사업(처리장) 추진  --  2011. 01 ~ 2011. 12

○ 잔여 공사추진  ----------------------  2012. 11 ~ 2012. 12

제276회 전주시의회 임시회

복  지  환  경  위  원  회

「2011년」

50억이상 주요사업

맑 은 물 사 업 소

목         차

일련 번호	제 목	쪽
1	「상수도 전면개량을 통한」 맑은물 공급사업	1
2	팔복배수지 건설 및 혁신도시 배수관 포설	2
3	지곡배수지(고지대용) 건설 추진	3
4	하수처리 편입구역 하수관거사업	4
5	중앙처리구역 하수관거 정비사업	5
6	효자처리구역 하수관거 정비사업	6
7	합류식 하수도 초기우수(CSOs)처리시설 사업	7
8	전주하수처리장 총인처리시설 설치사업	8
9	매암지구 마을하수도 정비사업	9

「상수도 전면개량을 통한」맑은물 공급사업

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2009. 3월 ~ 2014. 3월 (5개년)

○ 사업구역 : 전주시 급수구역 일원

○ 사 업 비 : 1,436억원[융자금 400, 일반회계 400, 특별회계 636]

○ 사업규모

- 블록안정화 128개블록, 노후․불용관 전면개량 50개블록

- 통합관리센터 신축(서신배수지내) 및 전산시스템 구축 1식 등

□ 추진상황

○ 1차분 공사 준공 (사업비 256억원) …… ‘09.  3. 24 ~ ’10.  7. 23

○ 2차분 공사 준공 (사업비  89억원) …… ‘10.  4.  1 ~ ’10. 12. 28

○ 3차분 공사 착공 (사업비 118억원)  …………………   ’10. 12. 29

□ 금후계획

○ 3차분 공사 준공 …………………………………………… ’12.  4.

○ 전체분 공사 준공 …………………………………………… ’14.  3.

□ 투자계획(재원대책)                              (단위 : 백만원)

구 분		소 요 예 산	확 보 액	잔 여 액				비 고
				합 계	‘11년 추경	‘12년	‘13년 이후
사업비	계	143,653	52,445	91,208	10,000	37,000	44,208
	융 자 금	40,000	24,059	15,941	10,000	5,941
	일 반	40,000	5,000	35,000	-	15,000	20,000
	특 별	63,653	23,386	40,267	-	16,059	24,208

※ 유수율 85% 달성시 연 86억정도의 누수절감 효과 발생

팔복배수지 건설 및 혁신도시 송배수관 포설

□ 개     요

○ 사업규모 : 배수지(34,500㎥) 건설 및 송․배수관 매설(11.4km)

○ 총사업비 : 26,305백만원(시 14,715, 국 9,315, LH 만성지구 부담금 2,275)

○ 사업기간 : 2009. 9월 ～ 2012. 9월(4개년)

□ 그동안 추진상황

○ 팔복배수지 기본 및 실시설계 용역 ---------- ’09. 9 ～’10.  1.

○ 팔복배수지 송수관 포설(D900, L=1.6km) : ’10. 6 ～'10. 12.

○ 혁신도시 배수관 포설(D350～500, L=2.7km)  : '09. 9 ～'10. 12.

□ 금후계획

○ 혁신도시 송․배수관 포설(대로 1-16호 등) : ’11.  3.～’11. 12.

○ 팔복배수지 건설사업 시행 및 완공         : ’11.  3.～’12.  9.

□ 투자계획(재원대책)                             (단위 : 백만원)

구 분		소 요 예 산	확 보 액	잔 여 액				비 고
				합 계	‘11 추경	‘12년	‘13년 이후
사업비	계	26,305	19,927	6,378	1,500	4,878
	국 비	9,315	9,315
	특 별	14,715	10,612	4,103	1,500	2,603
	기 타	2,275		2,275		2,275		LH 부담금

※ 혁신도시 상수도 공급에 따른 국비 전액 확보(9,315백만원)

지곡배수지(고지대용) 건설 추진

□ 개    요

○ 시설규모 : 시설용량 V=15,000톤(용수공급량 Ｑ=21,000톤/일)

○ 총사업비 : 13,500백만원(공사 12,000, 설계 550, 감리 기타 950)

○ 사업기간 : 2011~2013(용역설계 2011, 사업시행 2012~2013)

○  급수구역 : 평화동 50,000여명(고지대, 다량수용가, 대성 대체)

□ 그동안 추진상황

○ 도수관 세관갱생(참천취수장～지곡, D600 L=2.6km) ---- ’05. 12.

○ 지곡 송수관 매설(우림교～삼천취수장, D600 L=2.9km) --- ’06.  5.

○ 수도정비기본계획 수립(대성수계 축소 및 지곡배수지 신설) -- ’10.  4.

○ 중기 지방재정계획 수립(’10. 8.) 및 용역과제 심의 --- ’10. 11.

□ 금후계획

○ 기본 및 실시설계 용역 ------------------- ’11.  2.～’11. 10.

○ 지곡배수지 건설사업 시행 및 완공 --------- ’12.  3.～’13. 11

□ 투자계획(재원대책)                              (단위 : 백만원)

구 분		소 요 예 산	확 보 액	잔 여 액				비 고
				합 계	‘11 추경	‘12년	‘13년 이후
사업비	계	13,500	550	12,950		6,500	6,450
	국 비
	일 반	6,000		6,000		3,000	3,000
	특 별	7,500	550	6,950		3,500	3,450

□ 문제점 및 대책

○ 시 재정 형편상 사업비 적기 확보 어려움

⇒ 시민의 생명수인 상수도 안정적 공급 위해 일반회계 등 특별지원(60억)

하수처리 편입구역 하수관거사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 평화동 장교마을 등 48개 마을

○ 사업규모 : 관거신설 L=76.4㎞, 배수설비 2,045개소(5,300세대)

○ 총사업비 : 39,844백만원(국 19,790, 시 17,046, 기금 3,008)

- 기   투   자 : 12,295백만원(국 7,511, 시 3,462, 기금 1,322)

- 2011년 예산 : 7,666백만원(국 4,183, 시 2,812, 기금 671)

○ 사업기간 : 2007년 ～ 2012년(6개년)

□ 그동안 추진상황

○ 지방재정 투융자심사 완료(행정자치부)  ---------   2007. 10.

○ 실시설계용역 및 행정절차 이행  ---  2007. 06. ~ 2008. 08.

○ 4개지구(중복․전주천,평화,중인,박물관지구) 공사착공  --  2008. 10.

- 전체 L=76.4㎞ 중 L=18.2㎞ 완료(전체 공정: 30%)

- 완료구간 : 색장동 은석마을 외 9,  삼천교 ～교도소,

세내교～ 중인교, 박물관 주변(중복천)일부지역 완료

□ 추진계획

○ 하수관거(L=14.0㎞ : 평화․삼천동 일원) 시행

○ 잔여구간 사업 추진  -------------------   2012년 완료 예정

□ 투자계획

(단위:백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘11 년	‘12 이후	비 고
계		39,844	12,295	7,666	19,883
국비	국고보조	19,790	7,511	4,183	8,096
	균특회계
	특 교 세
시 비		17,046	3,462	2,812	10,772
기 금		3,008	1,322	671	1,015

□ 재원대책

○ 하수도사용료 인상(현실화율 70%)으로 부족재원 확보.

○ 새만금특별법 개정시 국비 지원률 80%로 상향 요구.

○ 지방비 부담분중 도비 지원 요구(0% ⇒ 10%)

중앙처리구역 하수관거 정비사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 중앙, 풍남, 노송동일원(노송천복원사업 상류지역)

○ 사업규모 : 관거정비 L=27.6㎞, 배수설비 3,302가구

○ 총사업비 : 30,000백만원(국 15,000, 시 12,750, 기금 2,250)

- 기   투   자 : 7,097백만원(국 2,720, 시 4,002, 기금 375)

- 2011년 예산 : 3,545백만원(국 1,725 시 1,193, 기금 627)

○ 사업기간 : 2009년 ～ 2012년(4개년)

□ 그동안 추진상황

○ 지방재정 투융자심사(전라북도)  -----------------  2008. 10.

○ 중기지방재정계획 반영  ------------------------  2008. 12.

○ 실시설계용역 완료  ----------------------  2009. 03. ～ 08.

○ 행정절차이행(재원협의, 설계자문, 일상감사등) 완료 ---  2009. 10.

○ 공사발주 및 업체선정  -------------------  2009. 11. ~ 12.

○ 공사계약 및 착공(전체공정 : 10%)  -------------  2010. 01.

- 동양@사거리 ~ 중앙시장아케이트 ~ 시청앞 대신증권간 관로매설 완료

□ 추진계획

○ 하수관거(L=5.0㎞ : 시청 앞 ~ 경원동 주변) 시행

○ 잔여구간 사업 추진  ------------------  2012년 완료 예정

□ 투자계획

(단위:백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘11 년	‘11 이후	비 고
계		30,000	7,097	3,545	19,358
국비	국고보조	15,000	2,720	1,725	10,555
	균특회계
	특 교 세
시 비		12,750	4,002	1,193	7,555
기 금		2,250	375	627	1,248

□ 재원대책

○ 하수도사용료 인상(현실화율 70%)으로 부족재원 확보.

○ 새만금특별법 개정시 국비 지원률 80%로 상향 요구.

○ 지방비 부담분중 도비 지원 요구(0% ⇒ 10%).

효자처리구역 하수관거 정비사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 효자처리구역(효자동 일원), 하수처리장 주변마을 등

○ 사업규모 : 관거정비 L=25.0㎞

○ 총사업비 : 20,000백만원(국 10,000, 시 8,500, 기금 1,500)

- 기   투   자 : 49백만원

- 2011년 예산 : 1,000백만원(국 500, 시 455, 기금 45)

○ 사업기간 : 2011년 ～ 2014년(4개년)

□ 추진상황

○ 지방재정투융자 심사 완료(전라북도)  ------------  2009. 10.

○ 용역과제 심의 완료  --------------------------  2009. 11.

○ 계약(원가) 심사(전라북도)  ---------------------  2010. 12.

□ 추진계획

○ 실시설계용역 추진  ----------------------  2011. 01. ~ 12.

○ 공사착공 및 완료  ----------------  2012. 02. ~ 2014. 12.

□ 투자계획

(단위:백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘11 년	‘12 이후	비 고
계		20,000	49	1,000	18,951
국비	국고보조	10,000		500	9,500
	균특회계
	특 교 세
시 비		8,500	49	455	7,996
기 금		1,500		45	1,455

□ 재원대책

○ 하수도사용료 인상(현실화율 70%)으로 부족재원 확보.

○ 새만금특별법 개정시 국비 지원률 80%로 상향 요구.

○ 지방비 부담분중 도비 지원 요구(0% ⇒ 10%).

합류식 하수도 초기우수(CSOs) 처리시설 사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주천 및 삼천 일원

○ 사업규모 : 저류조 2개소(13만톤), 간이처리시설 2개소

○ 총사업비 : 69,700백만원(국 34,900 도 7,000 시 27,800)

- 기   투   자 : 898백만원(국 561 도 56, 시 281)

- 2011년 예산 : 4,065백만원(국 2,688 도 537, 시 840)

○ 사업기간 : 2009년 ～ 2013년(5개년)

○ 추진방법 : 환경부, 전북도, 전주시, 익산시, 김제시, 완주군

한국환경공단 협약체결 추진

□ 그동안 추진상황

○ 협약체결(환경부, 전북도, 4개시군, 환경관리공단)  ----  2009. 08.

○ 종합계획수립 및 타당성조사 용역 완료  -----------  2010. 02.

○ 기본계획 및 입찰안내서 용역 완료  ---------------  2010. 07.

○ 시설공사 입찰공고  ----------------------  2010. 08. ~ 12.

○ 실시설계 적격자 선정 및 우선시공분 계약  --------  2010. 12.

□ 추진계획

○ 실시설계 시행 및 주민설명회 개최  -----   2011. 1. ～ 2011. 3.

○ 공사착공 및 완료   -----------------   2011. 4. ～ 2013.11.

- 2011년 우선시공분 추진(전주환경사업소 저류조 10만톤)

□ 투자계획

(단위:백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘11년	‘12년 ~	비고
계		69,700	898	4,065	64,737
국비	국고보조	34,900	561	2,688	31,651
	균특회계
	특 교 세
도 비		7,000	56	537	6,407
시 비		27,800	281	840	26,679

□ 재원대책

○ 하수도사용료 인상(현실화율 70%)으로 부족재원 확보.

○ 새만금특별법 개정시 국비 지원률 80%로 상향 요구.

○ 지방비 부담분중 도비 지원 요구(10% ⇒ 23%).

전주하수처리장 총인처리시설 설치사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 송천동 환경사업소내

○ 사업규모 : 403천㎥/일, 총인(T-P) 2.0 ⇨ 0.2mg/L 이하

○ 총사업비 : 24,144백만원(국 12,072, 도 4,829, 시 6,036, 기금 1,207),

- 2011년 예산 : 3,226백만원(국 2,610, 도 51, 시 565)

○ 사업기간 : 2010년 ～ 2012년(3개년)

□ 그동안 추진상황

○ 새만금유역 총인처리 시설비 및 운영비 전액국비로 추진계획 수립

(국무총리실 수질개선기획단, 환경부)  ----------   2008. 12.

○ 환경부에서 새만금 환경분과 대책위원회에 인처리설비 도입방안보고

(전액 국비설치)  ----------------------------  2009. 04.

○ 4대강사업 총인처리 국비지원 비율과 동일하게 국비 50%, 지방비

50%로 변경  -------------------------------  2009. 10.

○ 지방재정투융자 조건부 심사(도비비율 협의 후 추진)  ---  2010. 10.

○ 용역과제 심의(시 기획예산과)  ----------------- 2010. 11.

○ 용역원가 심사(전북도 예산과)  ----------------  2010. 11.

○ 기본 및 실시설계 용역발주  -------------------  2010. 12.

○ 부시장․부군수회의시 도비비율 통보  ----------  2010. 12.

※ 전북도 2011년 도비비율 20% 조정 확정

□ 추진계획

○ 기본 및 실시설계 추진  ------------  2011. 01. ~ 2011. 08.

○ 공사발주(조달청)  --------------------------  2011. 09.

○ 공사착공 및 완료  -----------------  2011. 10. ~ 2012. 12.

※ 운영비 일부 도비지원 및 수질기준(0.2 ⇒ 0.3mg/L)완화 요구

□ 투자계획

(단위:백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘11년	‘12년 ~	비고
계		24,144		3,226	20,918
국비	국고보조	12,072		2,610	9,462
	균특회계
	특 교 세
도 비		4,829		51	4,778
시 비		6,036		254	5,782
기 금		1,207		311	896

□ 재원대책

○ 하수도사용료 인상(현실화율 70%)으로 부족재원 확보.

○ 새만금특별법 개정시 국비 지원률 80%로 상향 요구.

○ 지방비 부담분중 도비 지원 요구( 25%까지).

매암지구 마을하수도 정비사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 성덕동 일원(매암 외 4개마을)

○ 사업규모 : 하수처리시설 Q= 190톤, 하수관거 L= 8.7㎞

○ 총사업비 : 5,807백만원(국 4,065, 시 1,481, 기금 261)

- 기   투   자 : 1,540백만원(국 1,031, 시 434, 기금 75)

- 2011년 예산 :  265백만원(국 244, 기금 21)

○ 사업기간 : 2009년 ～ 2012년(4개년)

□ 그동안 추진상황

○ 실시설계용역 완료(177백만원)  ------------------   2009. 09.

○ 인가 및 공사발주(조달청)  ---------------------   2009. 11.

○ 공사착공(1, 2차분)   --------------------------   2009. 12.

○ 2차분 공사완료(하수관거 1.2㎞, 563백만원)---------   2010. 06.

○ 1차분 공사 재착수(처리장 ⇒ 관로공사 변경)  -----   2010. 08.

○ 하수처리장 예정지 수용재결 신청  --------------   2010. 10.

○ 하수처리장 예정지 수용재결 결정(지토위)  --------   2010. 11.

○ 하수처리장 예정지 보상 재협의 통보  -----------   2010. 12.

○ 1차분 공사완료(하수관거 1.4㎞, 650백만원)  -------   2010. 12.

○ 3차분 공사착공(하수관거 0.5㎞, 150백만원) --------   2010. 12.

□ 추진계획

○ 3차분 공사추진 및 완료  -----------  2011. 01. ~ 2011. 03.

○ 토지공탁 및 4차분 사업(처리장) 추진  --  2011. 01. ~ 2011. 12.

- 토지매입 137백만원, 처리장조성 3,953㎡ 128백만원

○ 잔여 공사추진  ---------------------  2012. 01. ~ 2012. 12.

□ 투자계획

(단위:백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘11년	‘12년 ~	비고
계		5,807	1,540	265	4,002
국비	국고보조	4,065	1,031	244	2,790
	균특회계
	특 교 세
도 비
시 비		1,481	434		1,047
기 금		261	75	21	165

□ 재원대책

○ 하수도사용료 인상(현실화율 70%)으로 부족재원 확보.

○ 새만금특별법 개정 시 국비 지원률 80%로 상향 요구.