제285회 제2차 정례회

복 지 환 경 위 원 회

- 2011년도 제2회 추경 세입‧세출 예산(안) -

주요사업설명서

맑은물사업소

상수도공기업특별회계

Ⅱ 주요 세부사업 설명서【상수도】

	【급수과 소관】
	ꊱ 개조공사비
	상수도 전면개량을 통한 맑은물 공급사업

ꊱ 상수도 급수 개조공사(p61쪽)

조 직 : 맑은물사업소 급수과	업무담당자 : 박진우(행정전화: 220-7823 )

1. 사업목적 및 필요성

○ 시민생활과 직결되는 맑고 깨끗한 상수도의 안정적 공급을 위한 급수관 개조

○ 기존 상수도 공급세대 물량부족등의 시민불편 해소를 위한 급수관 시설 확대

2. 사업추진근거

○ 전주시 상수도 급수조례 제6조

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 전주시 관내 일원

○ 사업내용 : 맑고 깨끗한 상수도의 안정적 공급을 위한 급수관 확대

○ 사업규모 : 계량기 개조 244전 (d=13~50mm)

○ 총사업비 : 179백만원

○ 사업기간 : 2011. 3 ~ 2011. 12

○ 지원형태 : 직접수행

4. 사전 행정절차 이행

○ 해당없음

5. ’11년 제2회 추경요구내용 및 산출근거

○ 사 업 량 : 계량기 신설 및 개조 60전 (d=20mm)

○ 소요예산 : 51백만원

○ 편성필요성 : 택지개발지구내 다세대주택내 기존 상수도 공급세대 물량부족에 따른                     급수불출 시민불편 해소를 위한 급수관 확대시설로 적정수량, 수압 확보

6. 연도별 투자계획                                          (단위 : 백만원)

재원별	총사업비	기투자액 (‘11년 1회추경까지)	‘11년 제2회추경	‘12년 이후	비 고
계	179	128	51
국 비
도 비
시 비	179	128	51
기 타

상수도 전면개량을 통한 맑은물 공급사업(p62쪽)

조 직 : 맑은물사업소 급수과	업무담당자 : 유희조(행정전화: 220-7825 )

1. 사업목적 및 필요성

○ 유수율 향상으로 상수도 경영의 합리화 도모

○ 선진화된 급수체계 구축으로 맑고 깨끗한 수돗물 공급

2. 사업추진근거

○ 전주시 상수도 경영혁신 방안 및 유수율 제고 종합계획 수립

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 전주시 급수구역 일원

○ 사업규모 : 블록고립 128개소, 블록정비 50개소, 통합관리시스템 구축 1식

○ 총사업비 : 1,436억원(지방채 400, 일반회계 400, 특별회계 636)

○ 사업기간 : 2009. 3월 ~ 2014. 3월

○ 지원형태 : 직접수행

4. 사전 행정절차 이행

○ 용역과제 심사 이행 완료      ○ 중앙 투․융자심의 이행 완료

5. 그간 추진사항

○ 공 사 착 공  ………………………………………………………………… ’09.  3. 24

○ 1․2차분 준공 (345억원) …………………………………… ’10. 7. 23 ~ ’10. 12. 28

○ 3차분 추진 (118억원)  ……………………………………………… ’10. 12. ~ ’12.  4.

- 사업량 69km중 65km 매설완료 (현 공정 94.1%)

○ 4차분 추진 (187억원)  ………………………………………………… ’11. 9. ~ ’12. 9.

- 사업량 99.1km중 25.3km 매설완료 (현 공정 25.6%)

○ 사업설명회 개최 56회 (통장, 일반시민등 1,400여명)  ……………………… ’09. 3  ～ ’11. 10.

※ 공사 추진상황 :전체공정 35.4%

- 상수도관 매설 45개지역 256.5㎞ 매설완료

- 통합관리센터 신축완료, 급․배수관로 공사 추진중

6.’11년 제2회 추경 요구내용 및 산출근거

○ 사 업 량 : 블록고립 및 정비 5개소, 관로 매설 L=16km

○ 소요예산 : 3,168백만원

○ 사    유 : 상수도 전면개량을 통한 맑은물 공급사업 예산 확보(계속비 사업)

7. 연도별 투자계획(신규/계속)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액 (‘11년 1회추경까지)	‘11년 제2회추경	‘12년 이후	비고
계		143,653	68,445	3,168	72,040
시비	특별회계	51,694	24,386	3,168	24,140
	일반회계	40,000	10,000		30,000
지 방 채		51,959	34,059		17,900

하수도공기업특별회계

Ⅱ 주요 세부사업 설명서【하수도】

	【 하수과 소관 】
	ꊱ 하수처리 편입구역 하수관거사업	---
	중앙처리구역 하수관거 정비사업	---
	효자처리구역 하수관거 정비사업	---
	농촌마을 하수도정비사업(매암,진기,원석구)	---
	하수처리장 기계전기 등 노후시설 교체공사	---
	하수슬러지 처리시설	---
	전주하수처리장 총인처리시설	---
	하수관거 BTL사업 시설 임대료	---
	합류식하수도 월류수(CSOs)처리시설 설치	---

ꊱ 하수처리 편입구역 하수관거사업(147쪽)

(하수과, 정훈, 220-7793)

1. 사업목적 및 필요성

○ 도심하천 상류지역의 생활오수를 차집하여 하수처리장에 유입

○ 공공수역 수질오염 방지로 하천의 쾌적한 수변공간 제공

○ 농촌동 마을하수도 개량으로 시민 보건위생 증진

2. 사업근거 및 추진경위

○ 사업근거 : 하수도법 제11조(공공하수도 설치)

○ 하수도정비 기본계획변경승인(환경부) ----------------------- ‘07.07

○ 지방재정 투융자심사(행정자치부) --------------------------  ‘07.10

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 평화동 장교마을 등 48개 마을

○ 사업규모 : 하수관거설치 L=76.4㎞

○ 총사업비 : 39,844백만원(국비 19,790,  지방비 20,054)

○ 사업기간 : 2007 ~ 2012(6개년)

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 중기지방재정계획 반영(○)       ○ 투․융자 심사 이행  (○)

○ 공유재산관리계획 승인(  )       ○ 용역과제 심사 이행(○)

5. 그간 추진사항

○ 실시설계용역 보완 완료 -------------------------------------  ‘08.08

○ 행정절차이행 (재원협의, 설계자문등) -------------------------  ‘08.08

○ 공사착수(4개지구 : 중복․전주천,평화,중인,박물관지구) ---------- ‘08.10

- 하수관거 L=76.4㎞ 중 L= 34.6㎞ 완료

○ 월드컵경기장지구 공사발주  ---------------------------------- ‘11. 11

6. ‘11년 제2회 추경 예산소요

○ 사 업 량 : 하수관거 L= 17㎞

○ 소요예산 : 당초 8,412백만원 ⇨ 변경 8,305백만원(감 746백만원)

○ 사    유 : 금강수계관리기금 운영계획 변경에 따른 감액 조정

7. 연도별 투자계획(계속)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액			‘11년 제2회 추경	‘11년 제2회 추경 이후	비고
			계	’10이전	’11당초
계		39,844	20,707	12,295	8,412	8,305	19,244
국비	국고보조	19,790	12,694	7,511	5,183	5,183	7,096
	균특회계
	특 교 세
도 비		1,419					1,419
시 비		15,627	6,020	3,462	2,558	2,589	9,576
기 금		3,008	1,993	1,322	671	533	1,153

ꊲ 중앙처리구역 하수관거 정비사업(147쪽)

(하수과, 송정훈, 220-7792)

1. 사업목적 및 필요성

○ 새만금 상류지역의 하천수질을 조기에 개선하여 만경강 생태계를 복원,

성공적인 새만금사업 추진에 기여하고

○ 진행중인 노송천, 건산천 자연형하천 복원사업 구간의 시너지효과 극대화로

시민에게 생명력 있는 수변공간 제공

○ 하천수, 지하수, 우수 등 불명수 감소로 인한 하수처리 경영 합리화

2. 사업근거 및 추진경위

○ 사업근거 : 하수도법 제11조(공공하수도 설치)

○ 하수도정비 기본계획변경승인(환경부) ------------------------ ‘07.07

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 완산구 풍남동,교동,노송동 일원

○ 사업규모 : 우․오수관거정비 L=27.6㎞

○ 총사업비 : 29,826백만원(국비 14,913,  지방비 14,913)

○ 사업기간 : 2010 ~ 2013(4개년)

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 중기지방재정계획 반영(○)       ○ 투․융자 심사 이행  (○)

○ 공유재산관리계획 승인(  )       ○ 용역과제 심사 이행(○)

5. 그간 추진사항

○ 실시설계용역 완료 및 행정절차 이행 ------------------------ ’09.10

○ 공사 착수             ------------------------------------- ‘10.01

- 하수관거 L=27.6㎞ 중 9.7㎞ 완료

6. ‘11년 제2회 추경 예산소요

○ 사 업 량 : 하수관거 L=5㎞

○ 소 요 예 산 : 당초 4,545백만원 ⇨ 변경 4,521백만원(감 24백만원)

○ 사       유 : 금강수계관리기금 운영계획 변경에 따른 감액 조정

7. 연도별 투자계획(계속)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액			‘11년 제2회 추경	‘11년 제2회 추경 이후	비고
			계	’10이전	’11당초
계		29,826	11,642	7,097	4,545	4,521	18,208
국비	국고보조	14,913	5,445	2,720	2,725	2,725	9,468
	균특회계
	특 교 세
도 비		1,893					1,893
시 비		10,783	5,195	4,002	1,193	1,516	5,265
기 금		2,237	1,002	375	627	280	1,582

ꊳ 효자처리구역 하수관거 정비사업(147쪽)

(하수과, 송정훈, 220-7792)

1. 사업목적 및 필요성

○ 새만금 상류지역의 하천수질을 조기에 개선하여 만경강 생태계를 복원,

성공적인 새만금사업 추진에 기여하고

○ 공공수역 수질오염 방지로 하천의 쾌적한 수변공간 제공

○ 하천수, 지하수, 우수 등 불명수 감소로 인한 하수처리 경영 합리화

2. 사업근거 및 추진경위

○ 사업근거 : 하수도법 제11조(공공하수도 설치)

○ 지방재정 투융자심사(전라북도) ---------------------------- ‘09.10

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 완산구 효자동, 송천동 처리장 주변마을

○ 사업규모 : 우․오수관거정비 L=25.0㎞

○ 총사업비 : 20,000백만원(국비 10,000,  지방비 10,000)

○ 사업기간 : 2011 ~ 2014(4개년)

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 중기지방재정계획 반영(○)       ○ 투․융자 심사 이행  (○)

○ 공유재산관리계획 승인(  )       ○ 용역과제 심사 이행(○)

5. 그간 추진사항

○ 중기지방재정계획 및 투․융자심사 --------------------------- ’09.10

○ 용역과제 심사 완료 -------------------------------------- ‘09.11

※ ‘11 신규 국고보조사업 반영

6. ‘11년 제2회 추경 예산소요

○ 사  업  량 : 실시설계용역 1식

○ 소 요 예 산 : 당초 812백만원 ⇨ 변경 775백만원(감 37백만원)

○ 사       유 : 금강수계관리기금 운영계획 변경 및 실시설계계약 잔액 시비부분에 따른 감액 조정

7. 연도별 투자계획(계속)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액			‘11년 제2회 추경	‘11년 제2회 추경 이후	비고
			계	’10이전	’11당초
계		20,000	1,049	49	812	775	19,139
국비	국고보조	10,000	500		500	500	9,500
	균특회계
	특 교 세
도 비		1,900
시 비		6,600	504	49	267	224	8,184
기 금		1,500	45		45	51	1,455

ꊴ 농촌마을 하수도정비사업(매암)(147쪽)

(하수과, 박승원, 220-7797)

1. 사업목적 및 필요성

○ 농촌지역의 열악한 주건환경을 개선하여 주민생활 편익도모

○ 공공수역의 수질개선과 지역주민의 보건위생 향상에 기여

2. 사업근거 및 추진경위

○ 사업근거 : 하수도법 제11조(공공하수도 설치)

○ 하수도정비 기본계획변경승인(환경부)           : ‘07.07

○ 지방재정 투융자심사 (전북도, 전주시)          : ‘08.11

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 덕진구 성덕동 매암지구(매암, 대흥, 칠정, 이작, 원성덕)

○ 사업규모 : 처리시설 Q= 190㎥/일

하수관거 L= 8.7㎞

○ 총사업비 : 4,989백만원(국비 3,492  지방비 1,497) - 국비 70%

○ 사업기간 : 2009 ~ 2013(5개년) / ○ 지원형태 : 직접수행

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 중기지방재정계획 반영(○)       ○ 투․융자 심사 이행  (○)

○ 공유재산관리계획 승인(  )       ○ 용역과제 심사 이행(○)

5. 그간 추진사항

○ 매암지구 인가                                     : ‘09. 11.~’10. 02.

○ 매암지구 공사추진(1,2,3차분)                      : ‘09. 12.~’11. 04.

○ 매암지구 처리장 토지수용(재결 및 공탁)             : ‘10. 10.~’11. 02.

○ 매암지구 4차분 착공 및 완료(처리장)               : ‘11. 06.~’11. 11.

6. ‘11년 제2회 추경 예산소요

○ 사  업  량 : 하수처리시설 Q= 190㎥/일

○ 소 요 예 산 : 당초 867백만원 ⇨ 변경 768백만원(감 99)

○ 사       유 : 환경부 하수도사업 예산조정에 따른 변경 조정

7. 연도별 투자계획(계속)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액			‘11년 제2회 추경	‘11년 제2회 추경 이후	비고
			계	’10이전	’11당초
계		4,989	2,468	1,540	867	768	2,681
국비	국고보조	3,492	1,893	1,031	801	736	1,725
	균특회계
	특 교 세
도 비
시 비		1,248	434	434		-	814
기 금		249	141	75	66	32	142

ꊵ 하수처리장 기계․전기 등 노후설비 교체공사 (148쪽)

(하수과, 한복수, 220-7795)

1. 사업목적 및 필요성

○ 내구연한이 경과된 노후시설에 대하여 대수선공사 실시로 하수처리시설의  효율 제고 및 안정적 방류수질 확보

2. 사업근거 및 추진경위

○ 전주시와 전주개발(주)간의 변경(2차)협약(‘07.10.5)제45조⑧ 및 ⑨항의 내구년한이 경과한 시설물은 전주시에서 부담하여 교체

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 송천동 2가 1035번지(하수처리장)

○ 사업규모 : 노후설비 시설물 교체 1식

○ 총사업비 : 447백만원

○ 사업기간 : ‘11. 01. ~ ’11. 12.

○ 지원형태 : 직접수행

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 중기지방재정계획 반영(  )       ○ 투․융자 심사 이행(  )

○ 공유재산관리계획 승인(  )       ○ 용역과제 심사 이행(  )

5. 그간 추진사항

○ 실시설계 용역실시                                       : ‘11. 03.

○ 계약심사 완료                                           : ‘11. 04.

6. ‘11년 제2회 추경 예산소요

○ 사  업  량 : 기계 및 전기시설교체 1식

○ 소 요 예 산 : 당초 397백만원 ⇨ 변경 447백만원(증 50백만원)

○ 사       유 : 하특예산 부족으로 1회추경시 감액 사업비에 대해 금회 확보

7. 연도별 투자계획(신규)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액			‘11년 제1회 추경	‘11년 제1회 추경 이후	비고
			계	’10이전	’11당초
계		447	397		397	447
국비	국고보조
	균특회계
	특 교 세
도 비
시 비		447	397		397	447
기 금

ꊶ 하수슬러지 처리시설(148쪽)

(하수과, 이지영, 220-7796)

1. 사업목적 및 필요성

○ 2012년 해양투기 금지 정책에 따라 대책마련 필요

○ 하수찌꺼기의 안정적 처리로 자연환경보전에 기여

2. 사업근거 및 추진경위

○ 사업근거 : 환경부시책 사업 및 슬러지 해양투기 금지 방침

○ 자원관리과 종합리싸이클링 타운 조성사업과 병행추진

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 완산구 삼천동 안산, 삼산마을 인근

○ 사업규모 : 하수찌꺼기 처리시설 150톤/일(감량화 100톤 포함)

○ 총사업비 : 40,150백만원(국비 19,175 시비 900 민자 20,075) - 국비 50%

○ 사업기간 : 2003 ~ 2014. 12

○ 지원형태 : 민간투자

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 중기지방재정계획 반영(○)       ○ 투․융자 심사 이행(○)

○ 공유재산관리계획 승인(  )       ○ 용역과제 심사 이행(○)

5. 그간 추진사항

○ 종합 리싸이클링타운 민간투자사업으로 추진          : ‘09. 3

○ 사업추진방식 결정(민자투자 정부고시 방식)          : ‘09. 8

○ 민간투자 적격성조사 완료                            : ‘10. 3

○ 민투사업 지정, 민투심의 고시, 시설사업기본계획 고시 : ‘10. 8 ~ 9

6. ‘11년 제2회 추경 예산소요

○ 사  업  량 : 하수찌꺼기 처리시설 150톤/일(감량화 100톤)

○ 소 요 예 산 : 당초 434백만원 ⇨ 변경  0 백만원(△ 434백만원)

○ 사      유 : 환경부 하수도사업 예산조정에 따른 변경 조정

7. 연도별 투자계획(계속)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액			‘11년 제2회 추경	‘11년 제2회 추경 이후	비고
			계	’10이전	’11당초
계		40,150	1,515	1,081	434	0	39,069
국비	국고보조	19,175	571	181	390	0	18,994
	균특회계
	특 교 세
도 비
시 비		900	900	900
기 금			44		44	0
민 자		20,075					20,075

ꊷ 전주하수처리장 총인처리시설(148쪽)

(하수과, 이지영, 220-7796)

1. 사업목적 및 필요성

○ 새만금 상류지역은 방류수 수질기준이 2012.1.1일부터 총인(T-P) 2.0 ⇨ 0.2mg/L이하로 강화되어  “총인” 처리시설 설치 필요

2. 사업근거 및 추진경위

○ 하수도법 개정으로 방류수질 기준 강화(2012.1.1일부터 시행)

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 송천동 환경사업소 내

○ 사업규모 : 403천㎥/일 총인(T-P) 2.0 ⇨ 0.2mg/L이하

○ 총사업비 : 24,144백만원(국비 12,072, 도비 4,829, 시비 5,750, 기금 1,493)    ○ 사업기간 : 2010 ~ 2013(4개년)

○ 지원형태 : 직접수행

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 중기지방재정계획 반영(○)       ○ 투․융자 심사 이행(○)

○ 공유재산관리계획 승인(  )       ○ 용역과제 심사 이행(○)

5. 그간 추진사항

○도비 25%지원 확정으로 지방재정투융자심사                  : ‘10. 10

○ 용역과제 심의 의뢰(시 기획예산과)                         : ‘10. 11

○ 용역원가 심사 요청(전북도 예산과)                         : ‘10. 11

○ 2010년 환경부 국고 50%보조사업으로 변경 통보            : ‘10. 01.

○ 기본 및 실시설계 용역(기타공사) 착수                      : ‘10. 12.

○ 용역 과업수행 일시정지                                    : ‘11. 04.

6. ‘11년 제2회 추경 예산소요

○ 사  업  량 : 403천㎥/일 총인(T-P) 2.0 ⇨ 0.2mg/L이하

○ 소 요 예 산 : 당초 3,869백만원 ⇨ 변경 754만원(△ 3,115백만원)

○ 사       유 : 환경부 하수도사업 예산조정에 따른 변경 조정

7. 연도별 투자계획(계속)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액			‘11년 제1회 추경	‘11년 제1회 추경 이후	비고
			계	’10이전	’11당초
계		24,144	911	157	3,869	754	23,233
국비	국고보조	12,072	2,610	102	2,508	428	11,542
	균특회계
	특 교 세
도 비		4,829	1,305	51	1,003	235	4,543
시 비		5,750	254	4	47	47	5,699
기 금		1,493	311	-	311	44	1,449

ꊸ 하수관거 BTL사업 시설 임대료(149쪽)

(하수과, 정훈, 220-7793)

1. 사업목적 및 필요성

○ 새만금 상류지역의 하천수질을 조기에 개선하여 만경강 생태계를 복원,

성공적인 새만금사업 추진에 기여하고

○ BTL(Build-Transfer-Lease 건설-양도-임대)사업은 임대형민자사업 으로 민간의 자본과 기술을 도입하여 조기에 하수관거시설을 정비, 경제적이고 효율적인 운영관리를 통해 지하수․방류수역의 오염방지와 하수처리장 처리효율 제고 등을 도모하여 시민의 삶의 질 향상

○ 사업시행자 운영기간(20년) 동안 시설임대료 지급

2. 사업근거 및 추진경위

○ 사업근거 : 사회기반시설에 대한 민간투자법․시행령, 민간투자사업기본계획

○ 하수관거BTL사업 협약(환경부, 전주시, 환경관리공단) ---------- ‘05.05.

○ 하수관거BTL사업 실시협약(전주시. 환경관리공단, 사업시행자) ----  ‘06.03.

3. 사 업 개 요

○ 위       치 : 덕진구 송천동 외 10개동(덕진, 아중, 중앙, 화산, 효자처리구역)

○ 사 업 규 모 : 우․오수관거정비 L=116㎞, 배수설비 8,725세대

○ 투자사업비 : 105,196백만원(민간투자비, ‘05. 6월기준 불변가격)

○ 사 업 기 간 : 2005 ~ 2010. 5(6개년)

○ 사업시행자 : 전주아랫물길주식회사(시공자 : GS건설 외 5개사)

○ 임 대 금 액 : 240,439백만원(국비 120,219  지방비 120,220)

○ 임 대 기 간 : 2010. 6. ~ 2030. 5. (20년)

4. 그간 추진사항

○ 실시계획승인 및 공사 착공 ---------------------------------- ’06.04.

○ 사업완료               ------------------------------------- ‘10.05.

5. ‘11년 제2회 추경 예산소요

○ 임대료 지급 : ‘11. 3. ～ ’11. 12.(분기별 지급)

○ 소 요 예 산 : 당초 9,522백만원 ⇨ 변경 12,481백만원(증 2,959백만원)

○ 사       유 : 하특 예산부족으로 미확보한 운영비 부족분 및 금강수계관리  기금 운영계획 변경에 따른 조정

※ 민간투자법에 의한 완료사업으로 20년 동안 시설임대료 지급

6. 연도별 투자계획(계속)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액			‘11년 제2회 추경	‘11년 제2회 추경 이후	비고
			계	’10이전	’11당초
계		240,439	16,081	6,559	9,522	12,481	221,399
국비	국고보조	120,219	8,978	3,416	5,562	6,011	110,792
	균특회계
	특 교 세
도 비		12,022	556		556	601	11,421
시 비		107,580	6,547	3,143	3,404	5,251	99,186
기 금		618				618

ꊹ 합류식하수도 월류수(CSOs)처리시설 설치(149쪽)

(하수과, 박승원, 220-7797)

1. 사업목적 및 필요성

○ 새만금 상류지역의 비점 오염원에서 발생한 초기우수의 수질 오염을

근원적으로 차단하여 새만금 유역 수질개선

2. 사업근거 및 추진경위

○ 사업근거 : 하수도법 제11조(공공하수도 설치)

○ 협약체결(환경부, 전북도, 4개시군, 환경관리공단) : ‘09. 08.

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 전주하수처리장, 전주천 및 삼천 일원

○ 사업규모 : 저류조 2개소(130천㎥), 간이처리시설 3개소

○ 총사업비 : 69,698백만원(국비 34,849, 도비 6,970, 시비 24,442 기금 3,437)

○ 사업기간 : 2009년 ~ 2013년(5개년)

○ 사업방식 : 민간대행사업(한국환경공단)

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 중기지방재정계획 반영(○)       ○ 투․융자 심사 이행(○)

○ 공유재산관리계획 승인(  )       ○ 용역과제 심사 이행(  )

5. 그간 추진사항

○ 종합계획수립 및 타당성조사 용역완료               : ‘10. 02.

○ 기본계획 및 입찰안내서 용역 완료                  : ‘10. 07.

○ 시설공사 입찰공고                                 : ‘10. 08.~11.

○ 실시설계 적격자 선정 및 우선시공분 계약              : ‘10. 12.

○ 하수도시설 설치인가 신청 및 재원협의                 : ‘11. 09.~11.

○ 1차분 공사추진                                       : ‘10. 12.~‘11. 11.

- 전주환경사업소 중앙․덕진저류시설 터파기 및 가시설물 설치

6. ‘11년 제2회 추경 예산소요

○ 사  업  량 : 저류조 1개소(100천톤) 가시설 및 토공

○ 소 요 예 산 : 당초 4,066백만원 ⇨ 변경 3,502백만원(△ 564백만원)

○ 사       유 : 전북도 추경예산 조정에 따른 도비예산 변경

7. 연도별 투자계획(계속)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액			‘11년 제1회 추경	‘11년 제1회 추경 이후	비고
			계	’10이전	’11당초
계		69,698	5,663	898	4,066	3,502	65,298
국비	국고보조	34,849	3,249	561	2,688	2,688	31,600
	균특회계
	특 교 세
도 비		6,670	1,293	56	538	538	6,376
시 비		24,443	281	281			24,162
기 금		3,436	840		840	276	3,160