제285회 제2차 정례회

도 시 건 설 위 원 회

- 2011년도 제2회 추경 세입‧세출 예산(안) -

주요사업설명서

도 시 재 생 사 업 단

Ⅱ 주요 세부사업 설명서

○ 일반회계

［아트폴리스과 소관］

	ꊱ 풍남문주변 경관광장 조성	---	12

［스포츠타운조성과 소관］

	ꊲ 완산체련공원 게이트볼장 비가림 시설	---	13

ꊱ 풍남문주변 경관광장 조성(사업명세서 279쪽)

(아트폴리스과, 이광진, 2075)

1. 사업목적 및 필요성

○ 국가지정 문화재인 풍남문의 조망권을 확보하여 풍남문 주변 환경개선 및

전주 한옥마을을 찾는 관광객과 시민에게 편익제공 및 문화재 가치 향상

2. 사업근거 및 추진경위

○ 도비 보조금 교부결정 및 송금완료(1차 275백만원) --- 2011,4.28

○ 도비 보조금 교부결정 및 송금완료(2차 300백만원) --- 2011,7. 4

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 전주시 완산구 전동 77번지 일원 (풍남문 주변)

○ 사업규모 : 광장조성 A = 2,045 ㎡, 중로확장 L=50m

○ 총사업비 :795백만원(도비575, 시비 220)

○ 사업기간 : 2011. 5. ~ 2012. 3

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 중기지방재정계획 반영(  )       ○ 투․융자 심사 이행(  )

○ 공유재산관리계획 승인(  )       ○ 용역과제 심사 이행(  )

5. 그간 추진사항

○ 기본(디자인) 및 실시설계용역 착수 ------------------ 2011. 6

○ 기본(디자인) 및 실시설계용역 완료 ------------------ 2011. 11

6. ‘11년 제2회 추경 예산소요

○ 사 업 량 : 중로확장 L=50m

○ 소요예산 : 220백만원

○ 사    유 : 광장조성시 연접된 중로 확장(L=50m B=6m) 및 인도조성에

필요한 소요사업비 추가필요

7. 연도별 투자계획(신규/계속)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘11년 제2회추경	‘12년 ~	비고
계		795	575	220
국비	국고보조
	광특회계
	교부세 등
도 비		575	575
시 비		220		220
기 타

완산체련공원 게이트볼장 비가림시설

(사업명세서 280쪽)

(스포츠타운조성과, 이징근, 2938)

1. 사업목적 및 필요성

○ 게이트볼 동호인 들의 오랜 숙원사업으로 시민복지 증진에 이바지 하고, 전문․생활체육시설로 도민들의 건강 및 체력증진의 장으로 활용되고 햇빛․눈․비에 영향을 받지않는 전천후 실내 게이트볼구장을 건립하여 스포츠 저변확대 및 체육활성화를 도모

2. 사업근거 및 추진경위

○ 특별교부세 교부(350백만원) --- 2011,9.16

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 전주시 완산구 모악산 자라길 22번지일원 (완산체련공원)

○ 사업규모 : 철골 막구조 2면(1,200 ㎡), 인조잔디

○ 총사업비 : 350백만원(특별교부세)

○ 사업기간 : 2012. 3월 ~ 7월

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 해당없음

5. 그간 추진사항

○ 해당없음

6. ‘11년 제2회 추경 예산소요

○ 사 업 량 : 철골 막구조 2면(1,200 ㎡)

○ 소요예산 : 350백만원

○ 사    유 : 특별교부세 2011.9.16일 교부되어 전문가 의견수렴 및 절차이행                    등 연내 사업추진 어려움

7. 연도별 투자계획(신규)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘11년 제2회추경	‘12년 ~	비고
계		350		350		성립전예산
국비	국고보조
	광특회계
	교부세 등	350		350
도 비
시 비