제285회 전주시의회 제2차정례회

2011년도 행정사무감사특별위원회

2011년도

주요업무 추진상황 보고

맑은물사업소

보   고   순   서

□	일 반 현 황		-------	1
□	부 서 별 주 요 기 능		-------	2
□	기 본 현 황		-------	3
□	주요업무 추진상황		-------	8
	○	수 도 행 정 과	-------	9
	○	급 수 과	-------	12
	○	수 질 관 리 과	-------	21
	○	하 수 과	-------	26

일   반   현   황

□ 기   구 : 4과 13담당(1전산실, 1센터, 1시험소, 17사업장)

																																																								맑은물 사업소
			수도행정과																																					급 수 과																																수질관리과																				하 수 과
	수도행정							요금							체납징수																					맑은물공급											급수시설											누수방지			계량기관리												수질관리					수질분석						생산관리								하수행정			하 수 시설			하수정비
	전산실																				누수신고센터												계량기시험소													방수리 취 수 장							삼천취수장					원당취수장		전미취수장		상관취수장						인후배수지		천마배수지			효자배수지			완산배수지		송천배수지				서신배수지					금암배수지			화산배수지				대성정수장	지곡정수장		상관정수장	팔복정수장

□ 정‧현원

부 서 직 급		정 원	현 원
			계	수도행정과	급 수 과	수질관리과	하 수 과
합 계		94	91	21	26	32	12
일반직	소 계	56	55	11	16	16	11
	4급	1
	5급	4	4	1	1	1	1
	6급	13	13	3	4	3	3
	7급	23	27	6	5	12	4
	8급	9	5	1	2	-	2
	9급	6	6	-	4	-	1
연 구 사		4	3	-	-	3	-
기 능 직		34	33	10	10	13	1

※ 청경 15명,  공무직 20명

부서별 주요기능

과 별	분 장 사 무	비 고
수도행정과	• 맑은물사업소 운영 총괄 • 상수도공기업특별회계 운영 • 공사 및 용역계약, 물품관리 • 상수도사용료 과징업무 전반 • 상수도요금 인상 및 조례 개정 • 검침업무 관리 • 상․하수도급수전 관리 및 수도 단속
급 수 과	• 상수도 전면개량을 통한 맑은물 공급사업 • 상수도 중장기계획 수립․시행 • 비상급수계획 및 대책수립 총괄 • 급수공사, 상수도 증설 및 확장공사 • 간이상수도 유지관리업무 • 누수탐사 및 누수복구업무 및 누수방지대책 수립 • 누수신고센터 운영관리 • 급수중지․개전․폐전에 따른 계량기 관리 • 고장․노후계량기 교체관리 • 계량기시험소 운영관리
수질관리과	• 생활․공업용수 등 원․정수 확보 및 생산 • 광역상수도 수요에 따른 수급조절 및 관리 • 각 사업장 구축물․건물 유지보수 및 안전관리 • 국가공인수질검사기관 적정운영 및 정도관리 • 먹는물 공동시설(약수터) 및 간이상수도 수질검사 • 상수도 원․정수 수질관리 및 보전 • 상수원보호구역 관리
하 수 과	• 하수도공기업특별회계 운영 • 하수도사용료 조정 및 징수관리 • 금강수계관리기금 업무 • 하수관거 정비사업 • 하수관거정비 민간투자(BTL)사업 • 마을하수도 시설 및 유지관리 • 하수처리장 운영관리 및 시설물 유지관리 • 하수도 기본계획 수립

기  본  현  황

□ 급수 인구

총인구	급수인구	보급율 (%)	1일 1인 급수량(ℓ)	급수전	유수율(%)	무수율(%)	비고
646,535명	643,115명	99.47	394	203,495	62.82	37.18

□ 수계별 생산 및 급수구역

구 분			시설용량 (천㎥/일)	급수량 (천㎥/일)	급 수 지 역	급수인구	비율 (%)
총 계			328	292		643,115	100
생활용수	합 계		258	254	33개동	643,115	100
	자체상수도	대 성	40	25	서서학동 일부, 중화산1 일부, 완산동 일부, 효자1일부, 평화1.2일부	63,299	10
	광역상수도	전주권	218	229	중앙,풍남,노송, 서신, 동서학동, 서서학동 일부, 삼천1. 2. 3, 중화1일부,중화2, 평화1.2일부, 효자1일부.2. 3. 4, 진북, 인후1.2.3, 금암1.2, 덕진, 우아1.2, 호성, 팔복, 송천1.2, 조촌, 동산	579,816	90
공업 용수	팔복정수장		70	38	팔복동 1, 2산단(18개 업체 공급)

※ 생활용수 급수구역은 생산량 및 수요량에 따라 조절

□ 도․송․배․급수관

〔단위 : ㎞〕

총 연 장	도․송수관	배 수 관	급 수 관	비 고
2,199	57	730	1,412

□ 상수원 보호구역

상수도사업장	보 호 구 역			구역지정일	보호시설
	면적(㎢)	상류(Km)	하류(Km)		안내판	표주
계	27.657				42	132
방수리취수장	0.285	1.0	0.5	72. 5. 5.	8	26
상관수원지	26.655	전유역		24. 6. 9.	10	26
삼천취수장	0.284	2.2 (독배천0.7)	0.3	82. 6.19.	11	42
원당양수장	0.104	1.0	0.1	80. 8. 2.	6	15
전미취수장	0.329	0.5	0.3	67. 8. 5.	8	24

□ 상수원 수계별 『댐』 저수량

수 원	위 치	만수량(천㎥)	관리기관	비 고
계		817,139
상 관 제	완 주 군	2,139	전 주 시	대성수계보충
용 담 댐	진 안 군	815,000	수자원공사	전주권광역

□ 하 수 도

구 분		처리구역 (㎢)	계획연장 (㎞)	시설연장 (㎞)	미시설연장 (㎞)	보급율 (%)	비고
계		54.97	2,392	1,674	718	70.0
합 류 식			566	566	0	100.0
분류식	소 계	54.97	1,826	1,108	718	60.7
	오수관거	-	902	646	256
	우수관거	-	924	462	462

□ 차집관로

하 천 명	연 장 (㎞)	맨 홀 (개)	우수토실 (개소)	환기구 (개소)	여수토실 (개소)
계 (6개노선)	88.9	1,010	251	73	5
전주천 (좌, 우안)	23.5	369	142	37	4
삼 천 (좌, 우안)	15.4	155	45	18
금암천 (좌, 우안)	4.4	82	38	9
아 중 선	12.0	174	16	4
팔복선(공장,생활)	16.9	183	8	5	1
상 관 라 인	10.4	47	2
기 타	6.3

□ 하수․위생처리 시설

구 분	하 수 처 리	위 생 처 리
위 치	덕진구 송천동 2가 1035번지
시설용량	1일 처리능력 ⇨ 403,000㎥ - 1단계 시설 : 113,000㎥ - 2단계 시설 : 190,000㎥ - 3단계 시설 : 100,000㎥	1일 처리능력 ⇨ 290㎘ - 분 뇨 : 30㎘ - 정 화 조 : 260㎘
처리방법	1․2단계 고도처리(CNR)공법 3단계 고도처리(CSBR) 공법	하수 연계처리(1994년부터 시행)

□ 2011년 상수도 공기업 예산

총 규 모 : 81,167백만원

〔단위 : 백만원〕

세 입				세 출
계 : 81,167(100%)				계 : 81,167(100%)
▣ 상수도사업수익 : 65,684(80.9%)				▣ 상수도사업비용 : 47,956(59.0%)
◦ 영업수익 : ․ 급 수 수 익 : ․ 급수공사수익 : ․ 기타영업수익 : ◦ 영업외수익 : ․ 예금수입이자 : ․ 타회계전입금 : ․ 기타영업외수익 :	56,157 53,242 2,520 395 9,527 420 8,842 265			◦ 인력운영비 : ◦ 운 영 경 비 : ◦ 경 상 이 전 : ◦ 급수 공사비 : ◦ 지급이자 :	6,213 34,335 3,437 2,051 1,920
▣ 자 본 적 수 익 : 10,574(13.0%)				▣ 자본적 지출 : 33,211(41.0%)
◦ 자본적수익 :	10,000			◦ 자본투자비 :	27,761
◦ 자본잉여금수익 :	574			◦ 부채상환금 :	4,623
				◦ 기타자본적지출 :	257
▣ 예산외 계정 : 4,909(6.1%) (과년도계정)				◦ 예 비 비 :	570

□ 2011년 하수도 공기업 예산

총 규 모 : 48,237백만원

〔단위 : 백만원〕

세 입			세 출
계 : 48,237(100%)			계 : 48,237(100%)
▣ 하수도사업수익 : 18,069(37.5%)			▣ 하수도사업비용 : 12,155(25.2%)
◦ 영 업 수 익 : 16,825			◦ 영 업 비 용 : 11,861
. 하수도사용료수익 : . 기타영업수익 :	16,539 286		. 인력운영비 등	1,533
			. 운영경비 등	793
◦ 영업외 수익 : 1,244
			. 민간위탁대행사업비			9,535
. 수 입 이 자 : . 타회계전입금수익 :	236 1,008		◦ 영업외 비용 : 174
			◦ 특별손실 : 20
			◦ 예 비 비 : 100
▣ 자본적 수익 : 27,559(57.1%)			▣ 자본적 지출 : 36,082(74.8%)
◦ 자본잉여금수익:	27,559		◦ 가동설비자산 :		17,271
․ 타회계건설보조금:	25,059
			◦ 비가동설비자산 :		4,304
․ 공 사 부 담 금 :	2,500		◦ 고정부채상환금 :		710
▣ 예산외계정 : 2,608(5.4%) (과년도계정)			◦ 민간자본이전 :		13,588
			◦ 예 비 비 :		209

부서별 주요업무 추진상황

수도행정과  소관

급 수 과  소관

수질관리과  소관

하 수 과  소관

수 도 행 정 과  소 관

ꊱ	-상수도 사용 수용가의 납부편익을 위한- 「고지․납부방법 다양화」로 민원서비스 향상	----	10
ꊲ	-안정재정 확충을 위한- 체납 상수도사용료 징수율 제고	----	11

- 상수도 사용 수용가의 납부편익을 위한 -

『고지․납부방법 다양화』로 민원서비스향상 추진

○ 상․하수도 사용료에 대한 납부 및 고지방법을 다양하게 실시     하여 납부 편익을 도모하고 맞춤형 행정서비스 제공

□ 현   황

○ OCR 고지서 납부 : 시중은행, 제2금융권 등 납부가능

○ 가상계좌 납부 : 전북은행, 농협

○ 인터넷 지로(www.giro.go.kr) 납부

○ 공과금 수납기 (CD/ATM기) 납부

○ 자동이체 납부 : 모든 은행 가능( 요금 1% 할인,5,000원 한도)

○ 신용카드납부 : ARS(220-7700) 및 사업소 창구, 실시간 수납

□ 추진상황

○ 전자고지(E-mail)시스템 구축․운용 추진 : '11. 10 ~ 12

- 시    행 : '11.12월 중

- 사 업 비 : 3,300천원

- 내    용 : 맑은물사업소 홈페이지 서버 이용

전자고지 접수(신청․해지), 발송

□ 금후계획

○ 전자고지(E-mail)시스템 테스트 실시 : ‘11.11월 중

○ 전자고지(E-mail)시스템 홍보 : 연중

- 고지서 뒷면 이용한 홍보, 온라인 홍보(홈페이지 활용)

- 동주민센터, 공동주택, 다중이용시설 홍보문 게시

- 안정재정 확충을 위한 -

체납 상수도 사용료 징수율 제고

□ 현   황

○ 2011. 9. 30기준                     (단위 : 천건 /백만원)

구분 년도	조 정 액		징 수 액		체 납 액		징수율 (%)	비고
	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액
계	1,964	43,238	1,770	40,975	194	2,263	94.7
현년도	1,837	40,565	1,682	39,148	155	1,417	96.5
과년도	127	2,673	88	1,827	39	846	68.3

□ 그동안 추진상황

○ 상수도 사용료 체납자 납부 독려

- 고액․고질 체납자 계고장 방문 및 우편 : 15,314명 1,480백만원

- 체납자의 건물주 재산압류 예고문 발송  : 939명 358백만원

- 고액 및 고질 체납수용가 정수조치

․ 급수중지 511개소, 397백만원(개전 455개소, 340백만원)

□ 문제점 및 대책

○ 사용료에 대한 체납은 현장 징수독려가 최우선이며, 경기침체로 인한

휴, 폐업, 실직자 증가 부도 등 계속적 체납자가 증가하고 있으며,

고액체납자, 생계형 영세상인 등의 정수처분(단수)의 경우 강력한

반발로 행정의 어려움이 있으며, 분할 납부 징수하는 실정임.

□ 금후계획

○ 체납액 일소를 위한전직원 체납액 특별 징수기간」운영

-  기    간 : 2011. 11. 1(화) ~ 12. 31 (2개월)

- 징수목표 : 현년도 98%, 과년도 75%

- 직원별 독려대상

․체납징수팀(7명) : 담당동별 20만원 이상 체납자(1,909명 1,207백만원)

․전직원(70명정도) :  5만원이상 20만원 이하 체납자 (4,960명 482,497천원)

※ 전직원 1인당 체납자 70명, 체납액 7,000천원정도 담당 독려

급 수 과  소 관

ꊱ	상수도 전면개량을 통한 맑은물 공급사업	----	13
ꊲ	팔복배수지 건설 및 혁신도시 배수관 포설	----	14
ꊳ	고지대 급수난 해소사업(지곡배수지건설)	----	16
ꊴ	소규모 배수관 시설사업	----	17
ꊵ	긴급누수복구 및 누수탐사	----	18
ꊶ	학교 등 급수설비 개선 지원 사업	----	19
ꊷ	신속하고 완벽한 상수도 계량기관리	----	20

「상수도 전면개량을 통한」맑은물 공급사업

○ 2014년까지 유수율 85%이상 향상 및 선진화된 급수체계     구축으로 맑고 깨끗한 수돗물을 시민들에게 공급하고자 함

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2009. 3월 ～ 2014. 3월(5개년)

○ 위    치 : 전주시 전 급수구역 일원

○ 총사업비 : 1,436억원(특별회계 517, 일반회계 400, 지방채 519)

○ 사업규모

- 블록안정화 128개블록, 노후․불용관 전면개량 50개블록

- 통합관리센터 신축(서신배수지내) 및 전산시스템 구축 1식

- 상수도관 매설 703㎞(송․배수관로 279, 급수관로 424) 등

□ 그간 추진상황

○ 공 사 착 공  ………………………………………… ’09.  3. 24

○ 1차분 준공 (256억원) …………………………………’10.  7. 23

○ 2차분 준공 ( 89억원) ………………………………… ’10. 12. 28

○ 3차분 추진 (118억원) …………………………… ’10. 12 ~ ’12. 4

- 사업량 69.1km중 65km 매설완료 (현 공정 94.1%)

○ 4차분 추진 (187억원) …………………………… ’11.  9 ~ ’12. 9

- 사업량 99.1km 중 25.3km 매설완료 (현 공정 25.6%)

○ 사업설명회 개최 56회 (통장, 일반시민등 1,400여명) … ’09. 3월 ～ ’11. 10월

․공사 추진상황 : 전체 공정 35.4%

- 상수도관 매설 : 45개 지역 256.5㎞ 매설완료

- 통합관리센터 신축(건축물) 완료, 급․배수관로 공사 추진중

□ 금후계획

○ 시민홍보(주민설명회 등) 지속 실시 ……………………준공시까지

○ 전체분 준공 …………………………………………………… ’14. 3월

팔복배수지 건설 및 혁신도시 배수관 포설

○ 기존 송수관에서 직접 공급되는 조촌, 팔복, 동산동 지역에 간접     배수방식으로 공급하고,

○ 국가의 지역균형 발전계획에 따른 혁신도시, 법조타운, 장동, 유통단지

및 첨단산업단지 등의 생활용수를 안정적으로 공급하고자 함

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2009. 9월 ～ 2012. 12월(4개년)

○ 위    치 : 전주시 덕진구 팔복동･만성동 일원

○ 총사업비 : 26,305백만원(시비 14,715, 국비 9,315, LH공사 2,275)

- 기투자 20,125백만원 (2011년 4,001 - 국비 3,290, 시비 711)

- 미확보액 : 6,180백만원

○ 사업규모

- 배수지 34,500㎥/일(생활용수 30,000㎥, 공업용수 4,500㎥)

- 송․배수관 매설 L=11.4㎞(송수관 5.4㎞, 배수관 6㎞)

□ 그간 추진상황

[팔복배수지 건설] : 공정률 33.6%

○ 팔복배수지 건설 설계용역 추진 ------  ’09. 9. ~ ’10. 1.

○ 팔복배수지 건설사업 추진 ----------  ’10. 6. ~ ’12. 12.

- 송ㆍ배수관 매설 (L=3.9km중 2.5km완료, D=900㎜), 배수지 토공 90% 완료

[혁신도시 배수관 포설] : 공정률 67%

○ 혁신도시 배수관 포설 추진 ---------  ’09. 9. ~ ’12. 12.

- 배수관 포설(L=7.5km중 3.5km완료,  공업용수 가압장 완료)

□ 문 제 점

○ 2012년 12월말까지 혁신도시 상수도 공급(농진청 시험포 및       대한지적공사 등)이 필요하나 만성 복합단지 사업추진 일시중단에       따른 대로1-16호선 개설 지연으로 상수도 시설 설치 불가

□ 대    책

○ 2012년 준공 예정인 농진청 시험포 및 대한지적공사 등 수돗물       공급은 완주군 이서배수지 및 금평저수지에서 임시적으로 공급방안을       강구 혁신도시 상수도공급에 차질이 없도록 조치

○ 만성복합단지 LH(전북개발공사)사업계획에 대로1-16호선을       우선적으로 2012년 상반기 토지보상이 실시될 수 있도록 지속 협의

□ 금후계획

○ 팔복배수지 구조물 건설            : ’11. 11. ～ ’12. 05.

○ 배수지 구조물 방수 및 부대시설 설치 : ’12. 06. ～ ’12. 09.

○ 혁신도시 및 팔복배수지 전체사업 준공       : ’12. 12.

고지대 급수난 해소 사업(지곡배수지 건설)

○ 대성정수장 취수원인 임실오원천 주기적 물 분쟁 등 대성정수장     취수원 불안정으로 취수 중단시 평화동, 서서학동 고지대     지역의 급수불출 해소하고 배수지 건설로 안정적 용수공급      기여하고자함

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2011. ~ 2013.(3개년)

○ 위    치 : 전주시 완산구 평화동 2가 산104-4번지 일원

○ 총사업비 : 13,500백만원(공사 12,000 설계 550, 감리 및 기타 950)

○ 사업규모 : 배수지 건설 V=15,000㎥, 가압장 신설 Q=30,000㎥/일

- 2011년 확보예산 : 2,815백만원

○ 급수구역 : 평화동, 서서학동, 삼천3동 50,000여 세대

□ 그간 추진사항

○ 송수관로 매설 및 세관갱생 ------------------ ’05 ~ ’06

- 우림교~삼천취수장간 관로매설 L=2.9km, D=600mm , 사업비 2,827백만원

- 삼천취수장~지곡정수장간 세관갱생 L=2.6km D=600mm , 사업비 860백만원

○ 중기지방재정계획 수립 -------------------------- ’10. 8.

○ 기본 및 실시설계 용역 착수(85%)  ------------ ’11. 05.

□ 추진계획

○ 기본 및 실시설계 완료 ------------------------  ’11. 12.

○ 지곡배수지 건설사업 발주 ---------------------  ’12. 01.

○ 지곡배수지 건설  -------------------’12. 03. ~ ’13. 06.

소규모 배수관 시설 사업

○ 취락지역과 멀리 동떨어져 있어 상수도 공급혜택을 받지 못하고     지하수나 간이상수도를 음용수로 사용하고 있는 소규모 미급수지역에     상수도를 공급하여 행정신뢰도 제고 및 시민보건위생 개선

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2011. 3월 ~ 11월

○ 위    치 : 전주시 일원

○ 총사업비 : 320백만원

○ 사업규모 : 관로매설 L=2.5km, D=16~100mm

□ 그간 추진사항

○ 위    치 : 중인동 도계마을 외 6개소

(팔복동 덕촌마을, 대성동 내원당마을, 사대마을, 삼천동 석산마을

서서학동 예그린@주변, 여의동 공영@주변)

○ 사 업 량 : 배수관 포설 1.5km(D=50~100mm) 완료

○ 사 업 비 : 170백만원

○ 수혜가구 : 40세대 (150여명)

□ 금후계획

○ 삼천동 외졸마을 배수관 포설사업 추진 -  ’11. 10. ~ 12.

- 사 업 량 : 배수관 포설 L=1.0km (D100mm),  가압장 1개소

- 사 업 비 : 150백만원

- 수혜가구 : 약 70여세대 (250여명)

긴급누수복구 및 누수탐사

○ 상수도 시설물에 대한 돌발적인 누수 상황에 긴급 복구 대처

○ 집중적인 누수 탐사(야간)로 유수율을 향상시켜 누수 손실액 보존

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2011. 3월 ~ 12월

○ 위    치 : 전주시 전 급수구역 일원(맑은물공급 사업구간 제외)

○ 총사업비 : 500백만원(긴급누수복구 474, 누수탐사 26)

○ 사업규모 : 누수 복구공사 427개소(긴급누수복구 370, 누수탐사 57)

□ 그간 추진상황

○ 상반기 긴급누수복구사업 발주 ………………………… 251백만원

- 누수민원 처리 : 1,469건 (자체1,379, 단가업체 90)

(급수불출 539건, 도로누수 227건, 계량기실누수 218건, 앵글밸브교체 등 485건)

○ 누수탐사 용역 발주 ………………………………… 57개소 26백만원

- 도로 누수 등 26개소 탐사 완료 및 복구 조치

□ 금후계획

○ 하반기 긴급누수복구사업 발주(223백만원) ……………… ’11. 10월

- 사 업 량 : 각종 긴급 누수 복구 360개소 정도

○ 누수발생 예상구간 누수 탐사용역(단가계약) 지속 추진 ……연중

	야간누수탐사의 날 지정 운영
○ 기 간 : 2011. 8. ~ 2011. 12 (5개월간) ○ 지 역 : 전주 관내 전지역 (맑은물 공급사업 지역 제외) ○ 방 법 : 주 1회 목요일 (밤 10시 ~ 새벽 4시) ○ 탐 사 팀 : 3개팀 11명(자체탐사 2개팀 8명, 용역 1개팀 3명) ○ 장 비 : 9대(다점형 누수탐사기 2, 전자청음봉 2, 청음봉 5) ※ 8 ~10월중 야간탐사실적 : 41개소/ 긴급누수 복구 단가계약활용 즉시처리

학교 등 급수설비 개선 지원 사업

○ 시민에게 맑고 깨끗한 양질의 수돗물을 공급하기 위하여     노후된 옥내급수관 개량에 필요한 공사비 일부 지원

□ 사업개요

○ 지원범위 : 배관의 내부가 부식되어 수질기준을 초과하는 경우

○ 지원대상 : 학교, 주거용건물, 사회복지시설, 수급자 주택 등

○ 지원근거 : 전주시 상수도 급수조례 제 39조(급수설비의 관리 책임 등)

○ 지원범위

- 학    교 : 공사비의 70%이하(최대 20백만원)

- 공동주택 : 100세대미만(10백만원), 200세대미만(20백만원), 200세대이상(30백만원)

- 기초수급자 : 전액지원(최대 2백만원)

- 단 독 주 택 : 세대당 최대 30만원 이하(연면적 85㎡이하)

○ 사 업 비 :  150백만원

□ 그간 추진상황

○ 사업계획 수립 및 신청서 접수 …………………… ‘11. 2. ~ ’11. 3.

- 신청접수현황 : 13개소 중 3개소 심의대상자 선정

○ 급수설비지원 심의회 개최 및 지원대상자 선정 ……… ‘11. 4. 15.

(단위:천원)

대 상	수혜인원	사업내용	총사업비	자부담	지원금액	비고
3개소	6,441명		409,351	365,805	43,546
평화주공2단지	5,400명	급수관교체	390,000	360,000	30,000
해성중학교	1,014명	〃 세척	5,950	1,785	4,165
엘림은혜의집	27명	〃 교체	13,401	4,020	9,381

○ 공사 추진 및 지원금 지급(3개소, 43,546천원) ……… ‘11. 4. ~ ’11. 6.

○ 하반기 급수설비 지원대상자 접수 ……………… ‘11. 7. ~ ’11. 8.      - 대  상 : 3개소 (효자동 삼호@, 평화우미아파트, 조군자)

○ 하반기 급수설비 공사 추진 ……………………… '11. 9 ~ '11. 12

□ 금후계획

○ 하반기 지원사업시행 및 지원금 지급 ……………………‘11. 9. ~ ’11. 12

신속하고 완벽한 상수도 계량기관리

○ 유효만기 계량기의 완벽한 교체를 통해 정확한 사용량을     측정하고 계량기 고장 및 동파의 사전 예방조치 강화로     시민불편을 최소화함

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2011. 1월 ~ 12월

○ 총사업비 : 440백만원

○ 사업규모 : 계량기 교체 20,000개

ꠂ 유효만기 18,500개, 고장 및 동파 1,500개

(자체인력 8,500개, 대행업체 2,500개, 맑은물공급사업 9,000개 교체)

□ 그간 추진상황

○ 계량기 교체 추진 ……………………………… 18,456개 337백만원

- 유효만기 14,635개, 고장 및 동파 3,821개

(자체인력 7,607개, 대행업체 1,922개, 맑은물공급사업 8,927개)

○ 불량계량기 색출을 위한 고장계량기 성능시험 ……… 4,969개      - 구입계량기 3,559개, 노후․고장 1,249개, 민원시험 161개

□ 금후계획

○ 유효만기 및 고장 계량기 교체 지속 실시   : 1,544개  103백만원

○ 불량계량기 색출을 위한 계량기 성능시험 지속 실시

○ 상습동파 세대 집중관리 (2,000천원)         : ‘11. 11월 ~ 12월

- 최근 5년내 2회 이상 동파 발생 250세대

- 동절기 사전보온 조치(보온재 충전 및 동파방지 비닐설치)등

수 질 관 리 과  소 관

ꊱ	사회복지시설․저소득층 음용수 수질관리	--	22
ꊲ	배수지 내부 개량으로 맑은물 공급추진	--	23
ꊳ	깨끗하고 맛있는 수돗물 품질관리 및 안전성 검증	--	24
ꊴ	전국 최우수 수질검사기관․정수장 위상 강화	--	25

사회복지시설․저소득층 음용수 수질관리

‘폭 넓은 수도행정서비스’가 사회적 약자의 건강보전에 기여할 수 있도록

소외계층의 음용실태 파악 및 무료 수질검사를 시행, 부적절 음용사례 개선

□ 사업개요

○ 사업기간 : ‘11. 1. ~ ‘11. 12.

○ 사업대상 : 사회복지시설(65개소)

계	보육원	양로시설	요양원	재가노인 복지시설	노 인 복지회관
65	4	2	39	14	6

※ 영유아 보육시설(794개소) : ‘10년 ~ ‘12년까지 지속 시행

○ 사업내용 : 실태파악 및 무료수질검사를 통한 부적절 음용사례 개선

- 현지조사, 먹는 물 수질기준 검사 (검사수수료 79,700원/건 면제), 개선안 권고

□ 추진상황

○ ‘수돗물 이동상담반’ 현지 시료채수 및 먹는 물에 관한 상담

- 사회복지시설 : 65개소 점검 (적합 60, 부적합 5개소)

- 영유아보육시설 : 499개소 점검 (적합 445, 부적합 54)

○ 부적합 사례에 대한 원인분석 및 대안 제시(수돗물 음용 권장)

- 부적합 내용 : 정수기 필터 관리소홀로 일반세균 기준 초과

□ 금후계획

○ 시민이 호응하는 실질적 시책의 지속적 발굴

- 시민의 생활현장 방문, 먹는 물 수질검사 및 불편상담․해소에 중점

- 부적합시설에 대한 사후관리(지도) 및 수돗물 음용권장

※ 영유아보육시설, 소외계층, 지하수 음용가구 무료수질검사 지속 실시

배수지 내부 개량으로 맑은물 공급추진

광역상수도 배수지 내부 부식으로 누수 및 정수생산 이후 급수과정에서 ‘2차 수질오염’이 우려되어 노후시설의 교체 및 개량사업 추진

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2009 ~ 2012.

○ 사 업 명 : 광역상수도 배수지 내부 개량공사

○ 사업개요 : 3개 배수지 노후시설 교체 및 내부도장, 방수

- 인후(4지 14,454㎡), 천마(4지 14,700㎡), 효자배수지(2지 7,350㎡)

※배수지 시설규모 : 인후, 천마 각각 V = 30,000㎥, 효자 15,000㎥

○ 사 업 비 : 2,365백만원(기투자 1,200, 이후투자 1,165)

□ 그간 추진상황

○ 인후배수지 내부 개량공사 완료 ............ ‘09 ~ ‘10,

- 총 4지 내부 세라믹수지 코팅 및 노후 밸브 등 설비 개선

○ 천마배수지 총 4지중 2지 내부도장 및 설비 개선완료........‘11. 10월

□ 문제점 및 대책

○ 수돗물 소독제인 염소의 영향으로 내부 구조물(철제, 콘크리트) 부식 및 도장제(에폭시)가 수돗물에 용해되어 물의 색상 변질 우려(청색)

⇨ ‘수돗물 2차 오염’ 방지를 위하여 잔여 배수지 내부 개량공사 추진

□ 금후계획

○ 배수지 잔여물량 2012년도까지 개량 완료 : 총 4지 1,165백만원

- 천마배수지 2지 7,350㎡, 효자배수지 2지 7,350㎡

깨끗하고 맛있는 수돗물 품질관리 및 안전성 검증

○ 과학적 생산 공급 및 첨단 분석체제로 선진국 수준의 철저한 수질관리

○ 시민 소비자와의 소통을 통한 품질검증으로 수돗물의 상호 신뢰성 향상

□ 사업개요

○ 규정보다 강화한 수질관리 및 검사체제 설정․운영

- 검사항목(정수 57개 ⇒ 95개 항목) 및 검사주기, 대상 등 확대

○ 수돗물 신뢰성 향상을 위한 다양한 시책의 지속적 발굴, 추진

- 시민 모니터링제 및 품질인증제 등 ‘소통형’ 프로그램 추가개발

□ 추진상황

○ 수도행정 평가 및 제안 수렴을 위한 소비자 모니터단 구성, 운영

- 수돗물 음용 캠페인, 용담호 상수원 정화 등 “시민주도” 계도활동 전개

○ 수돗물 품질인증제 추진 : ‘11. 10월말 1,381개소 완료(6,000세대/‘07~현재)

※세대방문, 수질검사 및 불편상담을 통하여 수돗물 안전성 홍보 주력

○ 상수도 생산시설 견학 및 현장체험 : ‘11. 10월말 현재 39단체 2,525명

□ 금후계획

○ 첨단장비를 활용한 분석 및 수처리 전문인력의 과학적 수처리 공정 운영

- 적정 약품투입, 선진 처리공정으로 안전성은 물론 맛있는 수돗물 생산

○ 깨끗한 상수원수 확보를 위한 상수원 오염 감지시스템 운영

- 동절기 상수원 상류지역 오염원 유입 등에 철저한 대처

○ 수돗물 불편사항 모니터링 및 수도행정 평가, 정책제안 등에 시민참여율을 높여 ‘시민의 바람직한 뜻’이 반영되는 수도행정 구축

전국 최우수 수질검사기관․정수장 위상 강화

○ 환경부 평가 “4년 연속 만점 수질검사기관”의 위상 지속적 유지

- ‘08 전국 정수장 운영능력 평가결과 최우수정수장 선정에 걸맞는     최상의 상수도 생산․공급능력을 충분하게 발휘, 위상의 지속적 강화

□ 사업개요

○ 사업내용(목표성과)

- ‘11년도 환경부 공인검사기관․ 정수장 평가 우수한 성적 거양

- 검사기관을 활용한 다양한 시책 추진으로 수돗물 신뢰도 향상에 기여

	공인수질검사기관 운영현황
․ 국립환경과학원『먹는물 수질검사기관 제33호』지정 - ‘00.7.25 ․ 검 사 범 위 : 모든 먹는물, 상수원수, 먹는샘물, 각종 지하수 등 ․ 수수료 수입 : ‘00년 ~ ‘10년 3,385백만원(연평균 3억원정도)

□ 추진상황

○ 2011.6 국립환경과학원 평가결과 “4년 연속 만점기관”선정

○ 환경부 주관 ‘11년 수도사업 운영․관리실태 평가 실시

※ ‘11. 12월말 평가결과 발표 예정

○ 수은분석기 등 5종의 첨단 수질분석 장비 확보

□ 금후계획

○ 첨단 수질분석장비 도입에 따른 분석기술 연찬

- IC(이온크로마토그래피) 등 첨단장비의 분석기법 지속적 숙련    ○ 수질검사 유치 강화 : 검사기일 단축 등 “고객중심”의 검사기관 운영

○ ISO 14001 사후갱신 심사를 통한 정수장 대외 공신력 확보 및 신뢰도 향상

하  수  과   소 관

ꊱ	하수처리 편입구역 하수관거사업	--	27
ꊲ	중앙처리구역 하수관거 정비사업	--	28
ꊳ	효자처리구역 하수관거 정비사업	--	29
ꊴ	합류식 하수도 초기우수(CSOs) 처리시설 사업	--	30
ꊵ	전주하수처리장 총인처리시설 설치사업	--	31
ꊶ	매암지구 마을하수도 정비사업	--	32

하수처리 편입구역 하수관거사업

○ 전주․삼천 상류지역의 생활하수를 차집 하수처리장에 유입

○ 공공수역 수질오염 방지로 쾌적한 하천 수변 공간제공

○ 농촌동 마을하수도 개량으로 시민 보건위생 증진

□ 사업개요

○ 위    치 : 평화동 장교마을 등 48개 마을

○ 사업규모 : 관거신설 L=76.4㎞, 배수설비 2,045개소

○ 총사업비 : 39,844백만원(국 19,790, 시 17,046, 기금 3,008)

- 기   투   자 : 12,295백만원(국 7,511, 시 3,462, 기금 1,322)

- 2011년 예산 : 8,304백만원(국 5,183, 시 2,588, 기금 533)

○ 사업기간 : 2008년 ～ 2013년(6개년)

□ 추진상황

○ 지방재정 투융자심사 완료(행정자치부)  ---------   2007. 10.

○ 실시설계용역 및 행정절차 이행  ------  2007. 6. ~ 2008. 8.

○ 4개지구(중복․전주천,평화,중인,박물관지구) 공사착공 -- 2008. 10.

- 전체 L=76.4㎞ 중 L=34.5㎞ 완료(전체 공정: 45%)

□ 금후계획

○ 월드컵경기장지구 하수관거정비사업 착공  -----------   2011. 11.

- 하수관거 L=11.8㎞, 배수설비 435개소(장동 월드컵경기장일원)

○ 잔여구간 사업 추진  --------------------   2013년 완료 예정

- 하수관거 L=41.9㎞, 배수설비 1,586개소

중앙처리구역 하수관거 정비사업

○ 노송천 자연형하천 복원사업 상류 오염원 차단으로 시민에게 생명력      있는 수변공간 제공

○ 하천수, 지하수, 우수등 불명수 감소로 하수처리비 절감

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 중앙, 풍남, 노송동일원(노송천복원사업 상류지역)

○ 사업규모 : 관거정비 L=27.6㎞, 배수설비 3,302가구

○ 총사업비 : 30,000백만원(국 15,0000, 시 12,750, 기금 2,250)

- 기   투   자 : 7,097백만원(국 2,720, 시 4,002, 기금 375)

- 2011년 예산 : 4,521백만원(국 2,725 시 1,473, 기금 323)

○ 사업기간 : 2010년 ～ 2013년(4개년)

□ 추진상황

○ 지방재정 투융자심사(전라북도)  -----------------  2008. 10.

○ 중기지방재정계획 반영  -------------------------  2008. 12.

○ 실시설계용역 완료  ------------------------  2009. 3. ～ 8.

○ 행정절차이행(재원협의, 설계자문, 일상감사등) 완료 ---  2009. 10.

○ 공사발주 및 업체선정  -------------------  2009. 11. ~ 12.

○ 공사계약 및 착공  ------------------------------  2010. 01.

- 전체 L=27.6㎞ 중 L=9.5㎞ 완료(전체 공정: 39%)

□ 금후계획

○ 잔여구간 사업 추진  ---------------------  2013년 완료 예정

- 하수관거 L=18.1㎞, 배수설비 2,811개소

효자처리구역 하수관거 정비사업

○ 새만금 상류지역 목표수질 조기달성과 삼천 수질개선 시급

○ 하수관거 우․오수 분리와 건물 정화조 폐쇄로 시민보건 위생 향상

○ 하천수, 지하수, 우수 등 불명수 감소로 하수처리비 절감

□ 사업개요

○ 위    치 : 효자처리구역(효자동 일원), 하수처리장 주변마을 등

○ 사업규모 : 관거정비 L=25.0㎞

○ 총사업비 : 20,000백만원(국 10,000, 시 8,500, 기금 1,500)

- 기   투   자 : 49백만원

- 2011년 예산 : 818백만원(국 500, 시 267, 기금 51)

○ 사업기간 : 2012년 ～ 2014년(3개년)

□ 추진상황

○ 지방재정투융자 심사 완료(전라북도)  ------------  2009. 10.

○ 용역과제 심의 완료  ----------------------------  2009. 11.

○ 계약(원가) 심사(전라북도)  ---------------------  2010. 12.

○ 실시설계용역 착공  -----------------------------  2011.  2.

○ 기초자료 수집 및 현지조사 측량 -----------------  2011.  6.

○ 지반조사 및 시설물 세부 설계 --------------  2011.  7.～ 11

□ 금후계획

○ 실시설계용역 완료  -----------------------------  2011. 12.

○ 설계자문 및 재원협의  ------------  2011. 12. ~ 2012.  1.

○ 공사착공 및 완료  ----------------  2012.  2. ~ 2014. 12.

합류식 하수도 초기우수(CSOs) 처리시설 사업

○ 새만금 상류지역의 비점 오염원에서 발생한 초기우수의 수질오염을

근원적으로 차단하여 새만금 유역 수질개선

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주천 및 삼천 일원

○ 사업규모 : 저류조 2개소(13만톤), 간이처리시설 3개소

○ 사 업 비 : 69,698백만원(국비 34,849 도비 6,970 시비 24,443, 기금3,436)

- 기   투   자 :  898백만원(국비   561 도비  56, 시비 281)

- 2011년 예산 : 3,502백만원(국비 2,688 도비 538, 기금 276)

○ 사업기간 : 2009년 ～ 2013년(5개년)

○ 사업 추진방법 : 환경부, 전북도, 전주시, 익산시, 김제시, 완주군, 한국환경공단 협약체결 추진

□ 추진상황

○ 협약체결(환경부, 전북도, 4개시군, 환경관리공단)  ---  ’09. 8.

○ 종합계획수립 및 타당성조사 용역 완료  ------------  ’10. 2.

○ 기본계획 및 입찰안내서 용역 완료  ----------------  ’10. 7.

○ 시설공사 입찰공고  ------------------------   ’10. 8. ~ 12.

○ 실시설계 적격자 선정 및 우선시공분 계약  --------  ’10. 12.

○ 하수도시설 설치인가 신청 및 재원협의  -------  ‘11. 9. ~ 10.

○ 1차분 공사추진  ------------------------  ‘10. 12.~‘11. 10.

- 전주환경사업소 중앙․덕진저류시설 터파기 및 가시설물 설치

□ 문제점 및 대책

○ 전주시 지방비 부담률(50%)이 타 시군(익산, 김제 30%)에 비해

높아 재원부족으로 사업추진 지난

⇨ 국, 도비 지원률 70% 상향조정 요구(국비 50%⇒ 60%)

※ 도비(5%⇒ 10%) 기 결정, 국비 부담률(법령 개정) 조정요구

□ 금후계획

○ 2차분 공사추진  -----------------------   ’11. 10. ～ ‘12. 6.

○ 잔여차수분 공사추진  -----------------   ’12. 06. ～ ‘12. 12.

전주하수처리장 총인처리시설 설치사업

○ 새만금 상류지역은 방류수 수질기준이 2012.1.1일부터 총인(T-P)

2.0 ⇨ 0.2mg/L이하로 강화되어  “총인” 처리시설 설치 필요

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 송천동 환경사업소내

○ 사업규모 : 403천㎥/일, 총인(T-P) 2.0 ⇨ 0.2mg/L 이하

○ 사 업 비 : 24,144백만원(국비12,072, 도비4,829, 시비5,536, 기금1,707)

- 운영비 2,500백만원/년

- 기   투   자 : 157백만원(국비 102, 시비 51, 기금4)

- 2011년 예산 : 968백만원(국비 428, 도비 235, 시비 47, 기금 258)

○ 사업기간 : 2010년 ～ 2013년

□ 추진상황

○ 새만금유역 총인처리 시설비 및 운영비 전액국비로 추진계획 수립

(국무총리실 수질개선기획단, 환경부)  --------- --   ’08. 12.

○ 환경부에서 새만금 환경분과 대책위원회에 인처리설비 도입방안 보고

(전액 국비설치)  ---------------------------- ---   ’09.  4.

○ 4대강사업 총인처리 국비지원 비율과 동일하게 국비 50%, 지방비

50%로 변경  --------------------------------- --  ’09. 10.

○ 지방재정투융자 조건부 심사(도비비율 협의후 추진)  -----  ’10. 10.

○ 용역과제 심의(시 기획예산과)  -------------------  ’10. 11.

○ 용역원가 심사(전북도 예산과)  -------------------  ’10. 11.

○ 기본 및 실시설계 용역발주  -----------------------  ’10. 12.

○ 부시장․부군수회의시 도비비율 20%조정 통보 ----  ’10. 12.

○ 기본 및 실시설계용역 착수  -----------------------  ’11. 01.

□ 금후계획

○ 공사발주  ---------------------------------------   ’11. 12.

○ 공사착공 및 완료  --------------------  ’12. 01. ~ ’13. 12.

매암지구 마을하수도 정비사업

○ 새만금 상류지역의 하천수질을 개선하고자 농촌마을하수도 시설개량 및     우․오수 분리사업을 추진 악취발생 해소 및 주민 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 성덕동 일원(매암 외 4개마을)

○ 사업규모 : 하수처리시설 Q= 190톤, 하수관거 L= 8.7㎞

○ 총사업비 : 4,989백만원(국 3,492, 시 1,248, 기금 249)

- 기 투 자 : 1,540백만원(국 1,031, 시 434, 기금 75)

- 2011년 예산 : 768백만원(국 736, 기 32)

○ 사업기간 : 2009년 ～ 2013년

□ 추진상황

○ 실시설계 완료                            : ’09.  9.

○ 인가 및 공사발주(조달청)                 : ’09. 11.

○ 처리장 예정지 토지수용(재결 및 공탁)      : ’10. 10. ~ ’11. 2.

○ 1차 ~ 3차분 공사(하수관거 L=3.05km) 추진   : ’10.  6. ~ ’11. 4.

○ 4차분 공사 추진및완료(하수처리시설 190㎥/일)  : ’11. 6. ~’11. 10.

□ 금후계획

○ 잔여분 공사착공 및 완료  ------------------  ‘12. 1. ~ ’13. 12.

※ 하수관로(5.65km) 매설 및 배수설비(282개소) 설치         .