제285회 전주시의회 제2차정례회

2011년도 행정사무감사특별위원회

2011년도

주요업무 추진상황 보고

건설교통국

보   고   순   서

□	일 반 현 황		-------	1
□	부 서 별 주 요 기 능		-------	2
□	기 본 현 황		-------	3
□	주요업무 추진상황		-------	8
	○	도 시 과	-------	8
	○	교 통 과	-------	14
	○	주 택 과	-------	24
	○	도 로 안 전 과	-------	36
	○	생 태 복 원 과	-------	49
	○	차 량 등 록 사 업 소	-------	61

일   반   현   황

□ 기  구 : 5과 1사업소 26담당

																건설교통국
	도 시 과 (3 담 당)							교 통 과 (6 담 당)							주 택 과 (5 담 당)							도로안전과 (5 담 당)							생태복원과 (3 담 당)							차량등록 사 업 소 (4 담 당)
	도시행정							교통행정							주택행정							도로행정							도심생태							관 리
	도시계획							대중교통							공동주택							도로시설							노송천복원							등 록
	토지관리							택시화물							일반건축							도로정비							하천관리							의무보험
								교통지도							주거환경정 비							민 방 위														건설기계
								교통시설							주택재개발							재난관리
								교통정보

□ 정‧현원

과 별		총 계	일 반 직						계약	기능
			4급	5급	6급	7급	8급	9급
계	정 원	122	1	6	26	32	31	7	0	19
	현 원	122	1	6	26	58	11	1	1	18
도 시 과	정 원	15	1	1	3	5	2	2		1
	현 원	15	1	1	3	8	1			1
교 통 과	정 원	28		1	6	9	7			5
	현 원	28		1	6	12	3		1	5
주 택 과	정 원	20		1	5	4	9	1
	현 원	20		1	5	12	2
도로안전과	정 원	20		1	5	7	4			3
	현 원	20		1	5	10	2			2
생태복원과	정 원	12		1	3	4	3			1
	현 원	12		1	3	4	2	1		1
차량등록 사 업 소	정 원	27		1	4	3	6	4		9
	현 원	27		1	4	12	1			9

부서별 주요기능

과 별	분 장 사 무
도 시 과	○ 전문건설업 등록 관리 ○ 장기미집행 도시계획시설 매수청구 ○ 도시계획결정․지적고시, 도시계획사업 시행인가 ○ 도로명주소의 법적주소 전환, 개별공시지가, 지적측량검사
교 통 과	○ 교통종합계획 수립 ○ 대중교통(버스, 택시, 화물) 업무 추진 ○ 자동차운송사업체(버스, 택시, 화물 등) 지도 감독 ○ 공영주차장 확충 및 관리, 교통영향평가업무 ○ 교통안전시설물 설치 관리, 교통사고줄이기 사업 ○ 교통신호, 정보시설 설치 및 운영관리 ○ 지능형 교통체계(ITS) 설치 및 운영관리
주 택 과	○ 저소득계층 임대보증금 지원, 저소득가구 전세자금 지원 ○ 주택건설사업계획승인, 사용검사, 주택정책 수립 ○ 건축인․허가, 건축심의, 농촌지역 환경개선사업 ○ 공공건물 신축, 신 한옥플랜 추진, 도시주거환경개선사업 ○ 주택재개발․재건축 추진
도로안전과	○ 도로부지관리, 도로안내표지판 설치관리 ○ 도로포장 보수지도, 자전거도로 시설, 가로등 관리 ○ 신규도로개설 및 용지보상, 도시가로망 확충사업 ○ 가로환경 및 노점상 지도단속, 자전거이용 활성화 ○ 민방위, 재난방재 종합계획수립 및 재난재해대책 추진
생태복원과	○ 도심생태 복원계획 수립, 전주시 빗물관리시설 설치사업 ○ 노송천복원 프로젝트 추진 ○ 하천 기본계획 수립 고시 및 하천 유지관리 업무추진 ○ 생태하천 복원사업 추진
차량등록 사 업 소	○ 자동차등록(전산입력, 자료관리 및 증명발급 등) ○ 자동차 및 건설기계 과태료 부과, 건설기계사업자, 조종사면허관리 ○ 건설기계등록(전산입력, 증명발급, 검사최고, 정비명령 등) ○ 무보험차량조사(손해배상보장법위반 과태료, 범칙금부과 등) ○ 자동차등록번호판 제작 관리

기  본  현  황

□ 도시계획 연혁

년 월 일	고 시 청	번 호	계획면적 (㎢)	목표 년도	계획인구	주 요 내 용
1938. 5. 9	조선총독부	403	19.76	1948	100,000	도시계획구역 결정(1차)
1966. 2.10	국토해양부	2,188	108.71	1983	550,000	도시계획 재정비(2차)
1970. 4.14	″	178	157.22	1986	500,000	도시계획 재정비(3차)
1973. 6.27	″	258	313.20			개발제한구역 216.4㎢ 지정
1974. 8.14	″	272	313.20			도시계획 재정비(4차)
1976. 3.27	″	37	313.20			도시계획 재정비(5차)
1986. 5. 8	″	206	313.20	1991	610,000	도시계획 재정비(6차)
1995. 6.29	전라북도	112	313.20	2001	860,000	도시계획 재정비(7차)
2003. 6.26	국토해양부	161	302.67			개발제한구역 225.4㎢해제
2005. 7.29	전라북도	186	313.18	2010	748,000	도시계획 재정비(8차)

□ 용도지역 -- 4개지역 197.63㎢(비도시지역 8.65㎢제외)

구분	주 거 지 역				상업 지역	공 업 지 역				녹 지 지 역
	계	전용주거	일 반 주 거	준 주거		계	전용공업	일반 공업	준 공업	계	생산 녹지	자연 녹지	보전 녹지
면적	35.23	0.30	33.96	0.97	4.50	6.28	1.44	4.17	0.67	151.62	25.13	75.49	51.00
비율 (%)	17.8	0.1	17.2	0.5	2.3	3.2	0.7	2.1	0.4	76.7	12.7	38.2	25.8

□ 용도지구 ---------------- 7개지구 19,153,102㎡

지 구 명	개 소 수	면 적(㎡)	비 고
고 도	16	7,809,349
방 화	21	4,069,208
미 관	79	3,305,263
자연취락	157	3,300,963
경 관	7	413,140
시설보호	1	249,000
보 존	2	6,179

□ 토    지

(단위 : ㎢)

구분	합 계		대 지			임 야			기 타
	필지수	면적	필지수	면적	%	필지수	면적	%	필지수	면적	%
계	193,625	206.0	75,539	27.4	13.3	11,001	70.3	34.1	107,085	108.3	52.6

□ 운수업체

○ 버  스

(단위 : 대)

구분	총계	시 내 버 스						관광(전세)	비고
		소계	신성	전일	제일	호남	시민
대수	857	392 (10)	97 (2)	93 (2)	93 (3)	76 (2)	33 (1)	소계 465 ▪ 19개사 : 430 ▪ 영업소 : 4개사/35

※ ( ) 숫자는 예비차량

○ 택  시

(단위 : 대)

구 분	계	개인택시	회사택시	비 고
대 수	3,912	2,348	22개사/1,564대

○ 화  물

(단위 : 대)

구 분	계	개별사업자			일반사업자(5톤 이상)			비고
		소계	용달	개별	소계	법인	개인
대 수	3,662	1,907	925	982	1,755	1,657 (94개회사)	98

○ 주 차 장

(단위 : 대)

구 분	계	노 상	노 외				부 설
			소계	공 영	공한지	민 영
개소 /면수	14,749 /245,254	91 /4,239	433 /16,428	20 /1,704	60 /632	353 /14,092	14,225 /224,587

□ 교통시설

(단위 : 개소, 개)

교차로	LED 신호등 (개소)	제어기	보행자 음 향 신호기	보행자 잔 여 표시기	교 통 표지판	차 선	횡단 보도	횡단보도 조명등
604	604	476	242	848	10,744	▪1,108개노선 L=738㎞ ▪차선 L=2,604km	1,950 ▪신호 : 1,200 ▪비신호 : 750	178개소 495등

□ 지능형 교통시설

(단위 : 개소, 개)

BIS 설비	검 지 기			가변정보 전광판				CCTV
안내단말기 (BIT)	소계	신호용	구간용	소계	동영상	문자식	도형식
137	533	371	162	14	1	10	3	43

□ 주    택

(단위 : 세대)

구 분	계	단독주택	다세대주택 동당660㎡미만	연립주택 (4층이하)	아파트 (5층이상)	가구수	주 택 보급율
주택수	195,830	46,921	2,466	4,557	141,886	167,472	116.93 %
비율 (%)	100	23.96	1.26	2.33	72.45

□ 도    로

(단위 : 개소, ㎞)

구 분	계		고속국도		일반국도		지 방 도		시 도
	노선	연장	노선	연장	노선	연장	노선	연장	노선	연장
총연장	1,917	694	1	5	5	69	3	22	1,908	598
포장도	1,917	694	1	5	5	69	3	22	1,908	598
포장율 (%)		100		100		100		100		100

※ 도로율 : 16.38%(도로면적/시가지면적)

□ 교량 및 기타시설물

(단위 : 개)

구분 계	교 량					육교	지하 보도	지하차도	터널	비고
	소계	고속 국도	일반 국도	지방도	시도
153	124		38	2	84	16	6	5	2

※ 장대교량 (삼례교 : 570m, 회포대교 : 707m)

□ 자동차등록

(단위 : 대)

합 계	승 용 차	승 합 차	화 물 차	특 수 차
244,703	195,452	11,880	36,852	519

□ 건설기계조종사 면허현황

(단위 : 건)

계	불도저	굴삭기	로더	지게차	기중기	롤러	기 타 (3톤미만포함)
9,475	409	3,451	913	3,879	374	241	208

□ 도시 주거환경정비 예정지구 현황

방 식	개소수	면 적 (㏊)	세 대 수
			계	현 재	증 가
계	60	405.3	57,666	23,675	33,991
주택재개발	25	205.7	33,771	11,216	22,555
주택재건축	10	33.8	7,008	4,665	2,343
주거환경개선	16	98.6	8,805	4,425	4,380
사업유형유보	8	63.4	7,909	3,196	4,713
도시환경정비	1	3.8	173	173	-

□ 하천현황

(단위 : ㎞)

구 분		개소	하천연장	제 방 연 장			개수율 (%)	비고
				계	기개수	미개수
계		24	102.2	177.7	141.3	36.4	79.5
법정하천	소 계	21	96.2	164.9	134.9	30.0	81.8
	국가하천	3	14.8	28.8	28.8	-	100.0
	지방하천	18	81.4	136.1	106.1	30.0	78.0
소 하 천		3	6.0	12.8	6.4	6.4	50.0

도 시 과  소 관

ꊱ	장기미집행 도시계획시설 대지보상	----	9
ꊲ	도시기본계획 및 도시관리계획 재정비	----	10
ꊳ	가련산공원 진입도로 개설	----	11
ꊴ	도로명주소의 법적주소 전환	----	12
ꊵ	2011년도 개별공시지가 조사산정	----	13

장기미집행 도시계획시설 대지보상

○ 시민의 재산권 보호를 위한 장기미집행 도시계획시설 대지보상

○ 매수청구의 절차개선 및 처리기간 단축으로 주민편익 증진

□ 현    황(’02~’11.10월말 현재)

(단위 : 백만원)

구 분	장기미집행 도시계획시설 (대지)(A)	매수청구분 (B)	처리완료(C)					미보상 (D)	비율 (C/B)
			소계	보상	시설폐지	취하	제외
필 지	4,650	217	212	124	47	35	6	5	97%
면적(㎡)	319,591	38,293	37,501	22,251	7,839	6,912	499	792 (지장물포함)
보상액 (추정액)	368,000	26,339	26,088	18,742	4,327	2,336	683	251

□ 추진상황

○ 2011년 보상계획 : 1,577백만원(대지 2,000㎡ 정도)

- 매수청구신청 매수결정 토지 및 건축물 보상, 폐 건축물 철거

○ 보 상 완 료 : 대지 306㎡ 359백만원(철거공사비 포함)

○ 쉽고 빠르게 매수청구 절차 개선

- 매수청구 시홈페이지 온라인 접수, 매수결정 3개월(50%) 단축

- 총괄 및 사업부서 현지 합동출장 원스톱 처리 : 9건

□ 금후계획

○ 대지보상 계속 추진 ------------------------- 2011. 11~12.

○ 매수청구 활성화를 위한 장기미집행 대지보상 적극적인 시민홍보

도시기본계획 및 도시관리계획 재정비

○ 국토계획법 및 도시계획수립지침에 의거 매 5년마다 계획을 재검토

○ 도시공간구조와 토지이용계획을 재정립해 지속가능한 도시발전 도모

□ 사업개요

○ 범    위 : 전주시 행정구역 전역 206㎢

○ 용 역 비 : 1,414백만원(’09년 700, ’10년 400, ’11년 314)

○ 용역기간 : 2009.  5 ∼ 2012. 12.

○ 추진방향

- 아트폴리스 경관계획 및 문화창조도시 기틀마련을 위한 공간 설정

- 녹색성장과 지속가능한 도시발전을 위한 친환경 탄소산업 공업용지 확장

- 용도지역․지구(고도, 미관, 경관 등) 및 지구단위계획 검토

- 도시계획시설(도로 등 53개 시설) 민원사항 재검토

□ 추진상황

○ 도시기본계획(안) 수립 및 도시관리계획 검토 -- 2009.  6 ~

○ 도시기본계획(안) 전문가 자문 ---------------- 2010. 10.  7.

○ 도시기본계획(안) 도시건설위원회 간담회 ------ 2010. 10. 28.

○ 도시기본계획(안) 공청회 및 주민의견 청취 ---- 2010. 12. 17.

○ 시의회 의견청취(완주군의회 포함) ------------ 2011.  1. 28.

○ 시 도시계획위원회 자문(원안자문) ------------ 2011.  3. 29.

○ 기본계획 승인신청(전라북도) ----------------- 2011.  5. 19.

○ 관련기관(중앙부처 및 도 관련부서) 협의 ------ 2011.  7. 14.

□ 금후계획

○ 관련기관 협의완료 및 승인(전라북도) --------- 2011. 12.

○ 도시관리계획(용도지역․지구, 시설 등) 추진 -- 2012.  1 ∼

○ 도시관리계획(재정비) 결정(시장) ------------- 2012. 12.

가련산공원 진입도로 개설

○ 병무청지구 재개발사업 민원해결을 위한 기상대 이전사업 추진으로

○ 새로운 기상대 이전부지와 주민들이 이용하는 진입로 확장개설이 필요한 실정임

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진동 하가마을 ∼ 가련산공원

○ 사업규모 : L=275m, B=8m

○ 사 업 비 : 800백만원(보상 500, 공사 300 - 미확보)

○ 사업기간 : 2010.  1 ∼ 2012. 10.

□ 추진상황

○ 가련산 공원 조성계획(기상대) 결정 ----------- 2009.  8. 26.

○ 전주기상대 진입을 위한 도시계획시설(도로) 결정 - 2010.  1.  8.

○ 정부 청사수급관리계획 승인(행자부) ---------- 2010.  5. 26.

○ 토지 및 지장물 보상추진 --------------------- 2010.  6. 15.

○ 토지수용 재결 ------------------------------- 2011.  5. 20.

○ 토지수용 재결 토지 및 지장물 보상금액 법원 공탁 - 2011.  7. 14.

□ 금후계획

○ 진입도로 예산확보 공사 착공 및 완공 -------- 2012.  2 ～ 12.

○ 전주기상대 청사 설계 및 착ㆍ완공 ---- 2010. 11 ～ 2013.  6.

※ 예산확보 : 2011년 159백만원(설계비), 2012년 7,250백만원(건축비)

도로명주소의 법적주소 전환

○ ’11. 7. 29 도로명주소 법적 고시 후 본격사용에 대비 주민등록 등 공적장부와 민간부문 주소전환 지원 및 민원서비스 필요

○ 주소전환의 혼란예방과 불편해소를 위한 홍보강화로 빠른 정착 유도

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2011.  1 ～ 2013. 12.

○ 전환대상 : 9,880종(핵심공부 7종, 일반공부 756종, 기타 9,117종)

※ 핵심공부 : 주민등록표, 사업자등록부, 외국인등록부, 가족관계등록부,

건축물대장, 건물등기부, 법인등기부

- 고지ㆍ고시대상 : 주소 사용자 410,842명

○ 사 업 비 : 359백만원(고지비용 297, 홍보비 62)

□ 추진상황

○ 도로주소 정비 및 시설물 설치 -------- 2008.  9 ～ 2010.  2.

○ 도로명주소 정착을 위한 홍보 : 17종 693회 방송광고 및 가두 캠페인, 교육 등

○ 도로명주소 예비안내 및 자료정비 ----- 2009.  9 ~ 2010. 12.

○ 도로명주소 방문ㆍ서면ㆍ공시송달고지 ------- 2011.  1 ～  6.

○ 도로명주소 민원처리 및 고지자료 작성 ------------ 2011.  7.

○ 도로명주소 고시(법적주소 전환) -------------- 2011.  7. 29.

○ 주민등록표 및 새올행정시스템 주소전환 ------- 2011. 10. 31.

□ 금후계획

○ 도로명주소 법적주소 전환(각종 공적장부 등) - 2011. 11 ~ 2013. 12.

○ 도로명주소 활성화를 위한 홍보강화 --- 2011. 11 ～ 2013. 12.

2011년도 개별공시지가 조사산정

○ 정확한 토지특성조사와 지가산정으로 공신력을 제고하고 토지관련

국세․지방세 및 각종 부담금 부과기준으로 활용

□ 개    요

○ 근거법률 :『부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률』

○ 대상필지 : 137,802필지(표준지 3,387필지)

- 사유지 : 122,032필지,     - 국ㆍ공유지 : 14,530필지

- 7. 1일 기준 수시분 : 1,240필지

○ 조사기준일 : 연 2회(1. 1,  7. 1 기준)

○ 결정ㆍ공시 : 5월 31일, 10월 31일

□ 추진상황

○ 개별공시지가 결정ㆍ공시(정기분) ------------ 2011.  5. 31.

○ 7. 1일 기준 토지특성조사 및 지가산정 - 2011.  7.  1 ~  8. 19.

○ 산정지가 검증 및 지가열람 의견 제출 검증 - 2011.  8. 22 ~ 10. 14.

○ 개별공시지가 심의 및 의견제출 결과통지 - 2011. 10. 17 ~ 10. 21.

○ 개별공시지가 결정․공시(수시분) ------------- 2011. 10. 31.

□ 금후계획

○ 이의신청 접수 ---------------------- 2011. 11.  1 ~ 11. 30.

○ 이의신청 지가 검증처리 -------------- 2011. 12.  1 ~ 12. 30.

○ 2012년 조사계획 수립 및 조사대상필지 파악 - 2011. 11. 29 ~ 12. 24.

교 통 과  소 관

ꊱ	공영주차장 조성	----	15
ꊲ	내 집 주차장 갖기 확대 추진	----	16
ꊳ	교통약자 교통안전교육 위탁 운영	----	17
ꊴ	장애인 콜택시 확대 운영	----	18
ꊵ	어린이 보호구역 개선사업	----	19
ꊶ	교통안전시설 확충 및 유지보수	----	20
ꊷ	교통정비 중기계획 용역	----	21
ꊸ	시내버스 유개승강장 설치	----	22
ꊹ	교통약자를 위한 보행신호등 개선	----	23

공영주차장 조성

○ 주차 수급실태 조사결과 주차난이 심각한 주차환경 개선지구에 대한

공영주차장 조성과 도심지 및 주택 밀집지역에 소규모 주차장을 조성함

으로써 주민편익 도모

□ 사업개요

○ 조성규모 : 3개소 321면정도

- 서신동 131, 인후1동 및 태평동 130, 신시가지 60

○ 사업기간 : 2011 ~ 2012(2개년)

○ 총사업비 : 8,487백만원

- 서신동 4,500, 인후1동 및 태평동 2,500, 신시가지 500, 소규모주차장 987

※ 2006년 주차수급 실태조사 순위에 의한 공영주차장 조성 및 주차난

심각지역 소규모 주차장 조성

□ 추진상황

○ 서신동 : 131면(공정률 85%) ------------- 2011. 12월 준공

○ 서부신시가지 : 2개소 74면 --------------- 2011. 12월 준공

○ 인후1동 : 주차면 32면, 지평식 ----------- 2011. 12월 준공

○ 태평동 : 주차면 28면, 지평식 ------------- 2011. 12월 준공

○ 소규모 주차장 조성공사 ------------------- 2011. 12월 준공

- 인후2동 : 2개소 52면 / 풍남초 옆 : 16면

□ 문제점 및 대책

○ 부지 매입시 감정가에 의한 협의매수로 적정부지 확보 지난

⇨ 실태조사 순위에 의해 주차장을 조성하되 부지확보 가능지역부터

주차장 조성 추진

○ 구도심 지역 및 주택 밀집지역은 나대지가 없어 적정규모 부지 확보 지난

⇨ 적정부지 확보 불가시 소규모 주차장 2~3곳 조성 무료개방

□ 금후계획

○ 서신동 외 6개소 주차장 조성완료 ------------- 2011. 12월중

내 집 주차장 갖기 확대 추진

○ 차량의 급속한 증가로 주차난이 심각한 오래된 공동주택 주차시설은

현저히 부족한 상황으로 단지 내 여유 공간을 활용, 주차장 확충시

지원함으로써 주차난 해소에 기여

□ 사업개요

○ 사업대상

- ’94년 이전 준공된 20세대 이상 공동주택으로써 단지 내 부대시설ㆍ운동시설ㆍ녹지시설 등 여유 공간을 주차장으로 행위허가(용도변경) 득한 공동주택  ※ 대상 공동주택 수 : 328개소

○ 사업기간 : 2011.  1 ~ 12.

○ 사 업 비 : 80백만원

○ 사업비 지원

- 최소 5면 이상 조성 가능 공동주택

- 1대당 50만원 최대 1,000만원(20대)까지 지원

□ 추진상황

○ 전주시 주차장조례 개정 ------------------------- 2010. 12.

○ 전주시 주차장조례 시행규칙 개정 ---------------- 2011.  1.

○ 해당 공동주택 안내문 발송 및 홍보 -------------- 2011.  6.

○ 공동주택 주차장 조성 : 8개소 131면 / 보조금 65백만원

※ 단독주택 : 8개소 8면 / 13백만원

□ 금후계획

○ 신청순위에 의한 주차장 조성비 보조/ 2012년 예산 2억원 계상

※ 예산부족시 추경 확보 지속추진

교통약자 교통안전교육 위탁 운영

○ 체험위주의 어린이 교통안전교육 등 교통약자를 위한 위탁운영으로

교통사고 줄이기 및 선진교통문화 향상 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 용정동 구 IC 주변(어린이교통공원)

○ 사업기간 : 2011.  4 ~ 2014.  3.(3년)

○ 사 업 비 : 88백만원(시 보조 80, 자부담 8) / 2011년도

○ 위탁기관 : (사)전북안전 생활실천 시민연합회

○ 내    용 : 교통약자 교통안전교육(10,000명 정도)

□ 추진상황

○ 어린이 교통사고 예방을 위한 교통공원 체험교육 : 250회 8,500명

○ 노인회관 순회교육 및 찾아가는 교통안전교실 운영 : 30회 120명

○ 녹색어머니, 교사 등 교통안전교육 강사 지원 : 12회 40명

○ 워킹스쿨버스 교통안전 지도자 교육 및 지도 : 5회 50명

□ 금후계획

○ 교통안전교육 위탁업체 실적 평가 ---------------- 2011. 12.

장애인 콜택시 확대 운영

○ 대중교통을 이용하기 어려운 교통약자에게 이동편의 제공

○ 안전하고 편리한 이동환경 조성으로 사회참여 기회 확대

□ 사업개요

○ 사업규모 : 장애인콜택시 35대 확보

※ 근거 : 교통약자이동편의 증진법 제16조(1,2급장애인 200명당 1대)

- 전주시 제1,2급 장애인수 : 6,916명

○ 사업기간 : 2010 ~ 2014(5개년)

○ 2011년 계획 : 5대 구입

○ 사 업 비 : 464백만원(차량구입 200, 운영비 264)

- 차량구입 : 40백만원/ 1대당, 운영비(년) : 24백만원/ 1대당

□ 추진상황

○ 장애인 콜택시 22대 확보(교통과 17, 생활복지과 5)

※ 2011년 5대 구입 계약완료

○ (사)전북곰두리봉사대 위탁운영

- 위탁기간 : 2010.  8.  1 ~ 2012.  1. 31.

- 이용실적 : 2010년(23,651건/40,005명), 2011년(22,325건/44,404명)

□ 금후계획

○ 장애인 콜택시 차량인수 및 운영 ------------------ 2012.  1.

어린이 보호구역 개선 사업

○ 교통약자인 어린이를 각종 안전사고로부터 보호하기 위하여 초등학교

어린이집 등 보육시설(100인 이상)주변 교통안전시설 보강

□ 사업개요

○ 사업규모 : 148개소(초등학교 67, 특수 5, 유치원 39, 보육 37)

○ 사 업 비 : 22,370백만원(국 11,185, 시 11,185)

ꋾ 교통안전시설 : 중앙초등학교 외 90개소  ꋾ CCTV 설치 : 전라초등학교 외 36개교

2011년 사업내용

○ 사업규모 : 은화학교 외 43개교(어린이보호 30, CCTV 14)

○ 사 업 비 : 4,582백만원(국비 2,291, 시비 2,291)

○ 사업내용 : 인도, 방호울타리, 시인성 확보시설, 말하는 CCTV 구축

□ 추진상황

○ 어린이보호구역 유지관리 발주 및 착수 ------------ 2011.  3.

○ 어린이보호구역 개선사업 실시설계 완료 및 발주 --- 2011.  6.

○ 어린이보호 말하는 CCTV 구축 착공 ------------- 2011.  9.

※「2011 어린이보호구역 개선사업」최우수 사례 선정 - 행정안전부

장관상 포상금 300백만원 확보(국비)

□ 문제점 및 대책

○ 방범관리의 종합적인 모니터링 통합관제센터 조기 구축 필요

⇨ 통합관제센터 구축 예산 확보(국비 753백만원)

⇨ 어린이 보호 CCTV 시스템도 통합관제시스템에 맞추어 설계․시공

○ 주민 상점 및 주택앞 인도, 휀스 설치 반대

⇨ 안전한 통행로 확보 방안 마련 및 민원인 지속 설득

□ 금후계획

○ 어린이보호구역 개선사업 공사 완료 --------------- 2011. 12.

○ 어린이보호 말하는 CCTV 구축사업 완료 --------- 2011. 12.

○ 어린이보호구역 유지관리 년간 단가계약 공사(연중) - 2011. 12.

교통안전시설 확충 및 유지보수

○ 교통안전시설(신호등, 교통표지판, 안전휀스, 차선도색, 반사경 등)

확충 및 정비로 교통사고 예방

□ 사업개요

○ 사업규모 : 교차로 10개소, 표지판 정비 350개소, 반사경 정비 120개,

시선유도봉 정비 700개, 안전휀스 설치 500m, 차선도색 400㎞

○ 사 업 비 : 2,500백만원(신호등 500, 안전시설 300, 차선도색 1,700)

○ 사업기간 : 2011.  1 ～ 12.

○ 사업내용

- 교통안전시설 설치(반사경, 갈매기 표지, 시선유도봉, 안전휀스 등)

- 신호등 설치, 위치개선, 집약화(신호등주, 보행등주, 가로등, 교통표지판)

- 교통표지판 설치(주의, 지시, 규제 등), 무단횡단 방지 안전휀스, 차선도색

- 횡단보도 조명등 설치(무신호 횡단보도, 주요교차로) 및 램프, 안정기 등 보수

□ 추진상황

○ 교통안전시설 설치 공사

- 무단횡단 방지 안전휀스 설치 415m, 교통표지판 설치 및 보수 379개소,

반사경 설치 및 보수 130개소, 시선유도봉 정비 750개

○ 신호등 시설 및 개선공사

- 신호등(경보등 포함) 신설 12개소, 개선 및 집약화 18개소, 기타 민원처리 812개소

○ 횡단보도 조명등 설치 및 보수 : 신설 25개소, 보수 148개소(램프, 안정기)

○ 차선도색 및 지우기 공사 : 216개노선 388㎞

□ 금후계획

○ 연간 단가계약 공사추진 ------------------------- 2011. 12.

교통정비 중기계획 용역

○ 도시의 공간구조 및 대･내외 여건 변화와 전망을 반영하여 합리적이고

효율적인 교통시설 및 교통체계 구축과 투자계획 마련

○ 일관성 있는 교통체계 구축을 위한 장기적인 계획 필요

□ 사업개요

○ 사업규모 : 전주시 관내

○ 사업기간 : 2011.  5 ~ 2012.  3.(10개월)

○ 총사업비 : 195백만원

○ 추진근거 : 도시교통정비촉진법 제8조, 10년 단위의 교통정비 중기계획 수립

○ 사업내용

- 교통정책의 목표와 방향 설정, 교통시설의 개선

- 대중교통체계의 개선, 교통체계 관리 및 교통소통의 개선

- 주차장의 건설 및 운영, 자전거이용시설의 확충

- 환경친화적 교통체계의 구축, 투자사업계획 및 재원조달 방안 마련

□ 추진상황

○ 용역발주 및 계약 -------------------------------- 2011.  5.

○ 교통현황조사(교통량, 통행속도, 교통시설 등) - 2011.  6 ~  7.

○ 주차실태조사 분석 ------------------------------- 2011.  8.

○ 장래목표년도별 통행분석 ------------------------- 2011. 9~

□ 금후계획

○ 중간보고회 -------------------------------------- 2011. 12.

○ 최종보고회 -------------------------------------- 2012.  2.

시내버스 유개승강장 설치

○ 시내버스 이용시민 편익증진 제공으로 대중교통 이용 활성화

○ 유개승강장 신속한 보수 및 청소 실시로 주민불편 최소화

□ 사업개요

○ 시내버스 승강장 : 937개소

- 유개승강장 : 538개소(57.4%)

- 미 설치    : 399개소(가능 227, 불가 172)

○ 사 업 비 : 300백만원(설치 200, 유지관리 100)

□ 추진상황

○ 상반기 유개승강장 제작 설치 착수 ------------ 2011.  3.  7.

○ 상반기 유개승강장 설치완료(10개소) --------- 2011.  8. 25.

○ 유개승강장 설치ㆍ관리대행 민간사업자 선정 --- 2011.  8. 26.

- 계약방법 : 공모(협약에 의한 계약 준용)

- 사업내용

ㆍ유개승강장 신규설치 : 50개소(2011 ~ 2012)

ㆍ유개승강장 유지관리(청소, 보수 등) : 538개소(8년간)

ㆍ승강장내 광고사업권 부여 : 200개소

○ 하반기 유개승강장 제작 설치 착수(10개소) --- 2011.  9. 30.

□ 추진방향

○ 보도폭 3M이상 확보 대상 및 시내방면 설치 가능지역 우선 설치

○ 도심권 노후화된 승강장 교체 설치하여 도심경관 개선

□ 금후계획

○ 유개승강장 설치ㆍ관리대행 민간사업자 협약 체결 -- 2011. 11.

○ 하반기 시내버스 유개승강장 설치완료(10개소) ----- 2011. 12.

○ 유개승강장 유지관리(파손 보수 및 청소) ---------- 2011. 12.

교통약자를 위한 보행신호등 개선

○ 교통약자(노약자, 장애인, 어린이 등)의 교통사고 예방

○ 잔여시간 표시기를 인식성이 우수한 숫자형으로 개선하여 보행자 안정성 확보

□ 사업개요

○ 대    상 : 편도 3차선 이상, 학교 앞 편도 2차선 도로

○ 사업기간 : 2011.  2 ~  6.

○ 사업규모 : 숫자형 잔여시간 표시기 436대, 음향표시기 60대

○ 사 업 비 : 245백만원

□ 추진상황

○ 숫자형 잔여시간표시기 설치 완료 : 436대 ------- 2011.  6.

○ 시각장애인용 음향신호기 설치 완료 : 60대 -------- 2011.  6.

※ 시설현황(2011.10) : 숫자형 잔여시간표시기 848대, 음향신호기 242대

【 참고사진 】

(현 행) 도형형 잔여시간표시기	(개 선) 숫자형 잔여시간표시기	시각장애인 음향신호기

주 택 과  소 관

ꊱ	저소득계층 임대보증금 지원	----	25
ꊲ	노후 공동주택관리비용 지원	----	26
ꊳ	건축심의 가이드라인 설정	----	27
ꊴ	농촌 주거환경개선사업	----	28
ꊵ	사회취약계층 주택개ㆍ보수 사업	----	29
ꊶ	농촌마을 빈집정비 및 주택개량사업	----	30
ꊷ	도시 주거환경개선사업	----	31
ꊸ	농ㆍ수산물 도매시장 수산동 냉동실 보수공사	----	32
ꊹ	아중도서관 신축공사	----	33
	주택재개발ㆍ재건축 정비사업 추진	----	34

저소득계층 임대보증금 지원

○ 무주택 저소득계층이 장기임대주택 또는 기존주택 매입임대주택에

입주할 수 있도록 임대 보증금을 무이자로 지원하여 주거생활 안정 도모

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2011 ~ 2014(4년간)

○ 사 업 량 : 400호(매년 100호)

※ 2011년 사업량 : 100호(영구임대 50, 국민임대 50)

○ 총사업비 : 4,600백만원(도비 40%, 시비 60%)

※ 2011년 예산 확보 : 500백만원(도비 200, 시비 300)

○ 지원대상 : 무주택 기초생활수급자중 장기임대주택 또는 기존주택

매입임대주택의 신규 입주자

○ 지원기간 : 2년 단위, 2회 연장 가능

○ 지원형태 : 무이자 지원

○ 지원근거 : 전라북도 저소득계층 임대보증금 지원 조례

□ 추진상황

○ 저소득계층 임대보증금 지원사업 공고 ------------- 2011.  3.

○ 지원대상자 접수 및 선정 통보 -------------------- 2011.  4.

○ 임대보증금 지원 --------------------------------- 2011.  4~

- 71가구 274백만원(도비 110, 시비 164)

(영구임대 17, 국민임대 7, 50년임대 2, 기존주택매입임대 45)

□ 문제점 및 대책

○ 저소득계층의 주거안정을 위하여 임대보증금 지속적 지원 필요

⇨ 지속적 사업이 될 수 있도록 다년간(2012~2014) 예산 반영

□ 금후계획

○ 임대보증금 지원 및 손실이 없도록 LH와 협의 점검

노후공동주택 관리비용 지원

○ 공동주택 단지내 노후시설 관리비용 일부를 지원․정비하여 주거환경개선

및 서민주거 안정 도모

□ 사업개요

○ 사업대상 : 306단지 61,135세대(15년이상 공동주택)

○ ’11년 사업비 : 201백만원

○ 지원금액 : 단지별 사업비의 70%이하, 1,000만원 이하 보조

※ ’05 ~ ’10년 지원 : 183개단지 1,760백만원(28,479세대)

□ 추진상황

○ 지원대상단지 홍보 및 접수(구청) - 2010. 12.  8 ~ 2011.  1. 17.

○ 신청단지 실태조사(심사위원 및 공무원) -- 2011.  2. 21 ~  2. 25.

○ ’11년도 공동주택관리비지원 심사위원회 개최 -- 2011.  3. 11.

- 58개단지 신청중 20개단지 선정(200백만원)

○ ’11년도 노후 공동주택시설 개선사업 완료 --------- 2011.  7.

□ 문제점 및 대책

○ 예산에 비하여 지원요청단지가 많아 과반이상 대상에서 탈락

- ’10년 예산 2억, 신청 54단지, 지원 20단지, 탈락 34단지

- ’11년 예산 2억, 신청 58단지, 지원 20단지, 탈락 38단지

⇨ 보다 많은 단지에 지원될 수 있도록 예산 확보 추진

□ 금후계획

○ ’12년 지원대상단지 홍보 및 접수 ---- 2011. 12 ~ 2012.  1.

※ ’12년 3월중 지원대상 단지 선정 통보

건축심의 가이드라인 설정

○ 획일화된 건축물을 탈피하고 주변 환경과 가로환경이 조화를 이루도록

건축물 배치에서부터 외관디자인까지 건축심의 가이드 라인을 설정

아트폴리스에 걸 맞는 고품격 미래 건축문화 실현

□ 사업대상

○ 100세대 이상의 공동주택

○ 미관지구내 건축하는 허가대상 건축물

○ 바닥면적의 합계가 5,000㎡ 이상인 다중이용건축물 등

□ 심의기준(안)

○ 배치계획 : 주변경관 및 인접건축물과의 조화가 되도록 기준설정

○ 교통계획 : 진ㆍ출입동선(이면도로 활용), 주차계획 및 주차장

바닥재료 등 기준제시

○ 입면 및 경관계획 : 입면 형태 및 공동주택단지의 전면 차폐율 기준 등

경관 및 열섬 개선방안 규정

○ 야간경관계획 : 규모별 야간경관 가이드라인 설정

(조명등의 개소 수, 빛, 색상, 조도 등)

○ 기    타 : 친환경, 에너지절약 및 저탄소 방안 등

□ 추진상황

○ 건축심의 가이드라인 작성 ------------------------ 2011.  2.

○ 전문가 간담회(주택과장, 건축사, 시정연구원 등) -- 2011.  4.

○ 도시건설위원회 간담회  -------------------------- 2011.  8.

○ 건축사협회 및 건축위원회 자문  ----------------- 2011.  9.

○ 언론, 기관, 단체 홍보  및 고시 ------------------ 2011. 10.

□ 금후계획

○ 건축심의시 가이드라인 적용 --------------- 2011. 11.  1~

농촌주거환경개선사업

○ 도시지역에 비해 상대적으로 소외받고 있는 농촌마을의 열악한 환경을

개선하여 살기좋은 농촌을 건설하고 도․농간 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 사업위치 : 12개동 181개 농촌자연마을

○ 사업기간 : 2005 ~ 2014(10개년)

○ 총사업비 : 200억원

- 기   투   자 : 122억원

- 2011년 예산 : 12억원(국비 6, 시비 6)

○ 사업내용 : 마을도로정비, 하수도정비, 축대설치 등 농촌마을 환경개선

□ 추진상황

○ 농촌지역개발계획 용역 완료 ---------------------- 2005.  2.

- 2009년 이전 추진 : 221건 완공, 110억원 집행

○ 국토부 도시활력증진지역개발사업 선정 ----------- 2009.  6.

○ 투융자 재심사 완료(재원변경)  ------------------- 2010.  6.

- 예산 재원변경【지방비 > 광역지역발전특별회계(국토부)예산】

○ 주민의견 수렴 및 사업대상지 선정 -------------- 2011.  1 ~  2.

- 8개마을 24건 12억원(완산 4.8, 덕진 7.2)

○ 설계 및 공사추진(6개마을 21건 완료) ------- 2011.  3 ~

□ 금후계획

○ 준공 및 정산 ----------------------------------- 2011. 12.

사회취약계층 주택개ㆍ보수 사업

○ 사회취약계층이 소유하고 있는 노후화된 주택 개․보수 사업을 통해

저소득층의 주거안정과 경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 사업대상 : 기초생활수급자의 자가주택으로서 개․보수가 필요한 주택

○ 사업기간 : 2011.  3 ~ 11.

○ 사업규모 : 170호(국비 80%, 시비 20%)

※ 지원금액 : 호당 6백만원

○ 사 업 비 : 1,020백만원(국비 816, 시비 204)

○ 사업대상 선정기준

- 건물대장상 경과년수가 오래된 주택으로 노후도가 심한 주택

- 기존 개․보수 사업의 수혜를 받은 주택은 후순위

- 개발예정지 내에 속한 주택, 불법건축물은 제외

○ 사업내용 : 주택개량, 옥상방수, 도배장판, 창호공사 등

○ 사업시행

- 대상자 선정  : 전주시

- 실태조사 및 사업시행 : 한국토지주택공사

□ 추진상황

○ 2011년 대상자 선정 제출(230호) ---------------- 2010. 12.

○ 2011년도 사업비 집행(LH공사 송금) ------------ 2011.  3.

○ 실태조사 및 대상자 확정(LH공사, 170호) -- 2011.  3 ~  7.

○ 사업 착공 및 추진 ------------------------ 2011.  8 ~

- 120호 완료(2011. 10월말)

□ 금후계획

○ 정산 및 주민만족도 조사 ------------------------- 2011. 12.

농촌마을 빈집정비 및 주택개량사업

○ 낡고 불량한 농촌주택의 개량을 촉진하는 등 농촌 주거환경 개선을 통해

농촌 지역의 주거문화 향상 및 주거복지를 실현하고 농촌 정주의욕 고취

□ 사업개요

≪ 농촌 빈집정비사업 ≫

○ 사업대상 : 농촌마을 빈집 23개동

○ 사 업 비 : 30.4백만원

○ 지원금액 : 빈집정비 1백만원/동, 슬레이트 정비 2.2백만원/동

≪ 농촌 주택개량사업 ≫

○ 사업대상 : 농촌지역 노후․불량주택을 개량하고자 하는 주민

○ 사 업 비 : 700백만원(도 6%, 시 14%, 농협 80%)

○ 지원금액 : 14개동(세대당 50백만원 이내)

□ 추진상황

○ 농촌 빈집정비사업 지원 --------------------- 2008 ~ 2010.

- 31개동 31백만원 지원

○ 농촌 주택개량사업

- 2009년도 : 21개동 840백만원 지원(동당 4천만원, 농협 100%)

- 2010년도 : 21개동 1,050백만원 지원

(동당 50백만원, 도 9%, 시 21%, 농협 70%)

○ 상반기 추진내용

- 2011년 사업홍보 및 신청 접수 ----------- 2011.  1 ~  2.

- 대상사업자 선정 및 공사추진     ----------- 2011.  3 ~

․빈집정비 23개동, 농촌주택개량 14개동

- 빈집정비 15개소, 주택개량사업 8개소 완료

□ 금후계획

○ 공사 준공 및 정산 ------------------------------- 2011. 12.

도시 주거환경개선사업

○ 주거환경이 불량한 지역을 계획적으로 정비하여 도시환경을 개선하고

주거생활의 질 향상에 이바지

□ 사업개요

○ 대    상 : 16개 구역(98.6ha)

○ 사업기간 : 2006 ~ 2013(8개년)

○ 총사업비 : 867억원(기투자 322, ’11년도 151)

○ 사업내용 : 도로 87개 노선(14,214m), 주차장 21개소(10,918㎡),

공원 20개소(14,373㎡), 녹지 1개소(593㎡) 등

□ 추진상황

○ 정비구역 지정 및 정비계획 수립 결정 고시(14개 구역) - 2008.  6 ~ 11.

○ 원각사 외 5개구역 10개노선 1,315m 도로개설 완료

○ 여의구역 외 11개구역 용지보상 추진

○ 간납대 외 5개구역 공사 추진

- 도로 21개 노선(3,697m), 주차장 8개소(3,113㎡), 공원 9개소(4,198㎡)

○ 거점확산형 시범사업(동산구역) 정비계획 수립 고시 - 2010.  3.

○ 종광대1구역 정비구역 지정 및 정비계획 수립 추진 - 2011.  4~

□ 문제점 및 대책

○ 거점확산형 시범사업(동산구역) 내 거점개발(공동주택) LH공사 참여 여부 미정

⇨ 사업지연으로 인한 주민불편 해소를 위해 정비기반시설 우선 추진

□ 금후계획

○ 정비기반시설에 대한 용지보상 및 공사 등 사업 지속 추진

○ 주민 요구사항 등 파악 검토․반영, 예산배정 조정

농ㆍ수산물 도매시장 수산동 냉동실 보수공사

○ 농․수산물도매시장 수산동 냉동실 바닥보수 및 시설 개선으로 인명,

재산피해 사전예방

○ 활용도 제고로 도매시장 운영 활성화

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 송천동 2가 492-36번지

○ 사업기간 : 2011.  6 ~ 12.

○ 사 업 비 : 720백만원

○ 보수면적 : 약 1,500㎡

※ 규    모 : 지상 2층 연면적 2,393㎡

※ 입주법인 : 4개법인(청과물 2, 수산물 2)

○ 사업내용 : 냉동실 바닥 제거 후 재시설 및 방열문 설치 등

□ 추진상황

○ 정밀점검실시(D급 판정, 필수 보수대상) ---------- 2009. 11.

○ 설계도서 작성  ----------------------------- 2011.  3 ～  4.

- 자체설계로 예산절약(15백만원)

○ 계약심사 완료 및 발주의뢰  ---------------- 2011.  4 ～  5.

○ 공사착수 ----------------------------------- 2011.  5. 30.

○ 제2냉동실(전주수산 및 수협) 보수완료 ----- 2011. 10.  6.

○ 제1냉동실(전주수산 및 수협) 바닥보수 ------ 2011. 10. 20.

□ 금후계획

○ 수산동 냉동실 보수공사 준공 ---------------- 2011. 12. 30.

아중도서관 신축공사

○ 우리시 동․남부지역은 인근 아파트 밀집지역으로 청소년과 중․장년층이

많이 거주하고 있어 문화와 정보를 접할 수 있는 도서관 건립에

대한 요구와 기대에 부응하고자 함.

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 인후동 1가(구총목어린이공원옆)

○ 건축규모 : 연면적 2,793㎡(지하 1층/ 지상 3층)

○ 사업기간 : 2011.  6 ~ 2012.  8.(14개월)

○ 사 업 비 : 60억(국비 24, 시비 36)

○ 설 계 자 : 미듦건축사무소 대표 최만규

○ 시 공 사 : (유)에스에이치건설 대표 조현중

○ 감 리 자 : 율그룹건축사무소 대표 강문수(건축)

□ 추진상황

○ 투융자 심사(전라북도) ----------------------- 2010.  8. 25.

○ 발주의뢰 및 개찰(적격심사)  ----------------- 2011.  6.  2.

○ 건축협의 완료(덕진구청)  -------------------- 2011.  6. 14.

○ 착   공  ------------------------------------ 2011.  6. 22.

○ 지하1층 골조공사 완료 --------------------- 2011. 10. 20.

□ 금후계획

○ 지상1～3층 골조공사 완료  ------------------- 2011. 11 ～ 12.

○ 준   공  ----------------------------------------- 2012.  8.

주택재개발·재건축 정비사업 추진

○ 주거환경이 불량하고 노후된 건축물을 개량․정비함으로써 도시 환경을

개선하여 시민 주거생활의 질을 높이고자 하며, 사업성  결여와 건설경기

침체로 사회이슈로 확산된 예정구역은 현 환경추세에 맞게 재정비 필요

□ 현    황

○ 예정구역 : 44개구역(재개발 25, 재건축 10, 사업유형유보 8, 도시환경정비 1)

- 기본계획 10년단위로 수립 및 5년마다 타당성 여부 검토 후

기본계획에 반영(도시 및 주거환경정비법 제3조)

□ 추진상황

ꊱ 추진위원회·조합 구성구역(24개)

구분 계	추진위 운 영	정비구역 신청진행	정비구역지 정	조합인가신청진행	조합인가	사업시행 인 가	착 공
24	7	2	3	2	8	1	1

【2011년 지도점검 실시】

○ 기간․대상 : 2011.  6 ~  8. / 20개구역

○ 내       용 : 자금차입 및 내역 등 회계관련 사항

○ 결        과 : 시정 및 행정지도 9개구역, 임원교육 실시

ꊲ 추진위원회 미구성구역(20개구역)

【2011년 상반기 주민설명회 개최】

○ 기    간 : 2011.  4 ~  5./ 주택과장 외 4인

○ 방    법 : 주민센터 순회방문 주민설명회 개최 ☞ 재정비계획 설명

○ 대    상 : 6개구역(반월, 학암, 전주교대인근, 쌍용, 월곡, 동초교북측)

【2011년 하반기 주민설명회 개최】

○ 기    간 : 2011.  9 ~  10./주택과장 외 4

○ 방    법 : 주민센터 순회방문 주민설명회 개최 ☞ 재정비계획 설명

○ 대    상 : 12개구역

- 태평2, 기자촌2, 낙원A인근, 강당재, 서원초교  일원, 거성․한성․부광, 반촌, 세원․거성, 숭실실고북측일원, 전주여고일원, 롯데A, 신우A

※ 예정구역 3개소(인후, 진북, 이동교)는 재개발 해제 적극 반대로 미포함

하고 태평2구역은 추진위원회가 구성되었으나 와해되어 포함 실시

□ 금후계획

ꊱ  추진위원회·조합 구성구역(24개)

○ 정비구역지정 및 조합인가 신청구역 행정절차 진행(우진․태하 외 3)

○ 추진위․조합 구성지역 임원 및 주민교육 ------ 2011. 11. 25.

ꊲ 추진위 미구성구역(20개)

○ 주민센터별 주민협의체 구성하여 해제동의서 징구 - 2011. 11 ~ 12.

- 16개동 18개 예정구역

○ 외지 거주자는 우편 발송하여 해제 동의서 징구 - 2011. 11 ~ 2012.  1.

○ 2012년 『2020년 목표 도시 및 주거환경정비 기본계획 수립』시       결과 반영 및 주민지원사업 병행시행

도 로 안 전 과  소 관

ꊱ	남부순환도로 개설	----	37
ꊲ	우전로 확장	----	38
ꊳ	동부대로 보행환경 개선사업	----	39
ꊴ	북전주 IC 진입로 확장	----	40
ꊵ	영상제작단지 진입로 개설	----	41
ꊶ	자전거전용도로 개설	----	42
ꊷ	교통사고 잦은곳 및 위험도로 개선	----	43
	도로안내표지판 정비	----	44
	외곽지역 가로등 설치 및 지하차도 조도개선	----	45
	집중호우 피해 복구사업	----	46
	북부권 국도대체우회도로 건설	----	47
	동서고속도로(새만금~전주~포항) 건설	----	48

남부순환도로 개설

○ 서남권 지역의 교통량을 외곽으로 분산시켜 도심교통난 해소

○ 외곽 도로망 구축으로 주변의 발전 및 교통편의 제공

□ 사업개요

○ 구    간 : 서서학동 공수교 ～ 동서학동 좁은목 ~ 한벽교

○ 사 업 량 : 연장 1,560m, 폭 25 ～ 35m

○ 사 업 비 : 45,057백만원(보상 25,600, 공사 19,457)

- 기   투   자 : 41,057백만원

- 2011년 예산 :  3,000백만원

○ 사업기간 : 1998 ～ 2012(15개년)

□ 추진상황(현공정 98％)

○ 공수교 ~ 거산황궁@ ～ 무궁화주유소간 도로개통 -- 2006.  5.

○ 전주교육대학 뒤 경관터널 시공완료 --------- 2009.  1 ~  6.

○ 거산황궁@ ~ 좁은목 간 상․하수관 매설 완료 - 2010.  8 ~ 10.

○ 거산황궁@ ~ 산성천 간 기층포장 완료 ----- 2010.  8 ~ 10.

○ 산성천 ～ 좁은목 간 도로포장 완료 --------- 2011.  1 ~  7.

○ 거산황궁@ ～ 좁은목 간 임시개통 ---------- 2011.  8.  1.

□ 금후계획

○ 거산황궁@ ~ 좁은목간 조경공사 추진 ------ 2011. 11 ~ 12.

○ 좁은목 ~ 한벽교 간 도로확장 준공 개통 ---------- 2012. 12.

우 전 로  확 장

○ 서부신시가지 ~ 전주공단 간 연결도로 교통 병목현상 해소

○ 황방산 공원을 이용하는 시민의 안전한 보행권 확보

□ 사업개요

○ 구    간 : 서곡광장 ～ 서부신시가지 경계(서곡주공아파트@ 뒤)

○ 사 업 량 : 도로개설 L=1,200m, B=20 ⇨ 35m

○ 사 업 비 : 10,500백만원(보상 3,000, 공사 7,500)

- 기   투   자 : 7,000백만원

- 2011년 예산 : 2,000백만원

○ 사업기간 : 2007 ～ 2012(6개년)

□ 추진상황(현공정 80％)

○ 서곡광장 가각정리(서곡광장 ~ 썬플라워 웨딩홀) 개통 - 2008.  4.

○ LG․대림아파트 방음시설(방음림 및 방음벽) 시공 - 2010. 11 ~ 12.

○ 쎈플라워웨딩홀 ~ 원서곡마을 입구 노상 토공작업 - 2011.  1 ~  3.

○ 전체구간 구조물 시공 및 상․하수관 부설 완료 - 2011.  3 ~  5.

○ 원서곡 마을 입구 ~ 서곡성당 간 노상 토공작업 - 2011.  4 ~  5.

○ 원서곡 마을 입구 하수도 공사 및 옹벽설치 -------- 2011. 10.

○ 보차도 경계석 설치 ------------------------------ 2011. 10.

□ 금후계획

○ 도로포장 및 교통시설물 설치---------------- 2011. 11 ~ 12.

○ 임시개통 ---------------------------------------- 2011. 12.

○ 공사완료(가로수, 완충녹지 등 시공) --------------- 2012.  6.

동부대로 보행환경 개선사업

○ 북부지역의 원활한 수송으로 물류비용 절감 및 국토 균형 발전 도모

○ 주변개발로 보행자가 증가함에 따라 도로확장 및 인도를 개설하여

보행자 교통사고 발생예방 및 주민불편사항 해소

□ 사업개요

○ 구    간 : 전미로 ～ 차량등록사업소

○ 사 업 량 : 연장 3,000m, 폭 18.5 ⇨ 35m

○ 사 업 비 : 15,000백만원(보상 4,000, 공사 11,000)

- 기   투   자 : 6,800백만원(국비 2,500, 시비 4,300)

- 2011년 예산 : 3,000백만원(국비 1,500, 시비 1,500)

○ 사업기간 : 2009 ～ 2013(5개년)

□ 추진상황(현공정 57％)

○ 전미로 ~ 기린육교(L=1,500m) 도로 확․포장 완료 - 2010. 12.

○ ’11년분(기린육교 ~ 대송장래식장, L=500m) 용지보상 완료 - 2011.  8.

□ 금후계획

○ 기린육교 ∼ 대송장례식장(L=500m) 도로확장 ---- 2012.  4.

○ 대송장례식장 ∼ 차량등록사업소(L=1,000m) 도로확장 - 2012.  5 ∼ 2013. 12.

북전주 IㆍC 진입로 확장

○ 북부권지역 교통소통 원활 및 개발촉진 기여

○ 지역 주민의 안전한 보행권 확보

□ 사업개요

○ 구    간 : 전미동 미산초교 ∼ 신미산 마을입구

○ 사업규모 : 연장 1,200m, 폭 5.5 ⇨ 25m

○ 사 업 비 : 9,100백만원(보상 2,100, 공사 7,000)

- 기   투   자 : 1,700백만원

- 2011년 예산 : 4,100백만원

○ 사업기간 : 2010 ∼ 2013(4개년)

□ 추진상황

○ 지방재정 투융자 심사(적정) ----------------- 2008. 11. 14.

○ 도시계획사업 실시계획인가 ------------------ 2009.  4.  7.

○ 기본 및 실시설계 용역 완료 ----------------- 2011.  2.

○ 공사발주 및 1차분 착공 --------------------- 2011.  6. 29.

○ 공사발주 및 2차분 착공 --------------------- 2011. 10. 17.

○ 편입토지 134필지 23,666㎡중 120필지 22,142㎡ 매입완료 - 2011. 10. 30.

□ 금후계획

○ 암거 등 구조물 및 토공 시공 -------- 2011.  7 ∼ 2012.  8.

○ 잔여토지(14필지 1,524㎡) 매입 ------------------ 2012.  3.

○ 전체공사 준공 및 개통 --------------------------- 2013. 12.

영상제작단지 진입로 개설

○ 전주영상제작단지가 2009년 준공되었으나 진입로가 없어 인접마을

진입로를 활용하고 있어 영화영상 메카 도시로서의 위상 확립을 위한

진입로 조기개설 필요

○ 인접 상림마을 주민의 오랜 숙원인 농산물의 원활한 수송로 확보로

지역주민 소득증대 및 안전한 통행로 확보

□ 사업개요

○ 구    간 : 완산구 상림동 서진로 ∼ 원상림마을 앞

○ 사업규모 : 연장 1,600m, 폭 12 ~ 35m

○ 사 업 비 : 16,000백만원(보상 6,000, 공사 10,000)

- 기   투   자  : 5,560백만원

- 2011년 예산 : 500백만원

○ 사업기간 : 2008 ∼ 2013(6개년)

□ 추진상황

○ 실시설계용역 추진 ------------------------ 2008.  3 ～  7.

○ 실시계획인가 ----------------------------------- 2008.  8.

○ 편입용지 보상 완료(150 필지 74,760㎡) -------- 2010.  7.

□ 금후계획

○ 공사발주 및 1차공사 착공 ----------------------- 2012.  2.

○ 전체공사 준공 개통 ----------------------------- 2013. 12.

자전거전용도로 개설

○ 전국 지역간 자전거도로 인프라 구축으로 자전거 동호인 및 자전거를

이용하는 시민들이 자전거를 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록

전용도로 개설

□ 사업개요

○ 위    치 : 김제시계(득룡교) ～ 조촌교차로 ～ 화개네거리 ～ (혁신도시)

○ 사업규모 : L=7.34km, B=3.0m

○ 사업기간 : 2010 ～ 2011(2개년)

○ 총사업비 : 3,517백만원(국비 1,665, 도비 500, 시비 1,352)

- 기   투   자 : 2,377백만원

- 2011년 예산 : 1,140백만원

□ 추진상황(현공정 90％)

○ 국가 자전거도로 기본계획 수립 통보(행정안전부) -- 2010.  8.

○ 1차구간 공사완료(김제 시계 ～ 성덕동, L=3.44km) - 2010.  8 ～ 2011.  3.

○ 2차 구간 공사 착수(성덕동 ～ 조촌교차로 ～ 화개네거리, L=3.9km) - 2011.  4.

- 자전거도로 조성 완료, 안전시설 설치 작업중

□ 금후계획

○ 2차구간 공사 완료 ------------------------------- 2011. 12.

※ 혁신도시구간(전라북도 시행)

- 화개네거리 ～ 혁신도시구간 공사 추진 -- 2010. 10 ～ 2012.  8.

교통사고 잦은곳 및 위험도로 개선

○ 교통사고 잦은곳 및 위험도로에 대하여 교통섬, 차로정비, 선형조정

등 교통사고 예방시설을 설치하여 안전한 도로환경 조성

□ 사업개요

○ 위    치 : 교통사고 잦은곳 및 위험도로

○ 사업내용

- 교통사고 잦은곳 개선(332백만원)

: 진북터널 사거리 구조개선, 인후6거리 회전교차로 설치

- 위험도로 구조개선(376백만원)

: 예수병원앞 구조개선, 금산사선(지방도 712호선) 위험도로개선

○ 총사업비 : 708백만원(광특 354, 시비 354)

○ 사업기간 : 2011.  2 ~ 12.

□ 추진상황(현공정 70％)

○ 진북터널사거리, 예수병원앞 공사 완료 ------------ 2011.  6.

○ 인후6거리 공사 착수 ----------------------------- 2011.  7.

○ 금산사선 관계기관 협의(전라북도, 김제시) -- 2011.  5 ~ 10.

- 급커브 구간 완화차로 설치 결정 : 2011. 10. 13..

□ 금후계획

○ 인후6거리 회전교차로 설치 완료 ------------------ 2011. 11.

○ 금산사선 위험도로개선 용역발주(도로관리사업소) -- 2011. 11.

○ 금산사선 위험도로 개선공사 추진 ------------ 2011 ～ 2013.

도로안내표지판 정비

○ 도로이용자의 혼란을 방지하기 위해 2009. 10월 전면 변경된 새주소

도로명으로 도로안내표지판의 도로명 수정

○ 도로망 확장 및 관공서 이전에 따라 기존 표지판 문안 정비

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 관내 도로안내표지판

○ 사업규모 : 640개소(문자수정, 판교체, 이설 등)

○ 총사업비 : 700백만원

- 2010년 : 200백만원,  2011년 : 500백만원

○ 사업기간 : 2010 ~ 2011(2개년)

○ 사업내용 : 도로명 변경 반영 및 관공서 이전 등 표지판 문안정비

□ 추진상황(현공정 90％)

○ 2010년 정비완료(120개소)

- 기린대로, 팔달로, 백제대로

○ 2011년 정비 완료(320개소) ----------------- 2011.  2 ~  6.

- 동부, 기린, 춘향로, 온고을, 가련산, 혁신로 등 주간선도로

□ 금후계획

○ 주간선도로 외 표지판 민원 및 도로명 수정(200개소) - 2011.  7 ~ 12.

외곽지역 가로등 설치 및 지하차도 조도개선

○ 조도가 낮은 시 외곽지역과 지하차도 내부 교통사고 예방을 위하여

도로 조명시설의 조도를 밝게 개선하여 교통사고 예방 및 야간통행

주민불편 해소

□ 사업개요

○ 위    치 : 시 외곽지역 및 관내 지하차도, 터널

○ 사업규모 : 가로등 50등 설치, 지하차도․터널 조도개선 500등

○ 총사업비 : 200백만원

○ 사업기간 : 2011.  2 ～ 12.

※ 신속한 민원처리를 위해 단가계약으로 추진

□ 추진상황(현공정 95％)

○ 외곽지역 가로등 설치 : 45개소

- 송천동, 덕진동, 효자동 등

○ 지하차도 조도개선 : 500등

- 월드컵, 송천, 안덕원 지하차도

□ 금후계획

○ 외곽지역 가로등 설치(동산동 등 5개소) ---------- 2011. 11.

집중호우 피해 복구사업

○ 태풍 무이파 및 2차에 걸친 집중호우 피해복구 사업을 조속한 시일 내에

마무리하여 시민불편 최소화

□ 피해복구 현황

○ 피해건수 : 226건(공공시설 81, 사유시설 145)

- 공공시설 : 하천시설물 파손 및 제방․농수로 유실 등

- 사유시설 : 주택(반파 3동/침수 51동), 농경지 및 조경수 침수 등

○ 총복구비 : 2,237백만원

□ 추진상황

(단위:백만원)

구 분	재 원	복구비	내 용	공정률
공공시설	재난관리기금 (응급복구)	277	․수해지역 장비임차 등 : 51개소	완료
	예 비 비 (항구복구)	1,785	․농업시설 : 545백만원 - 색장동 일원 등 5개소	50%
			․하천시설 : 1,240백만원 - 삼천, 전주천, 아중천	완료
사유시설	재난지원금	175	․주택(54건) : 66백만원 ․농업(89건) : 98백만원 ․산림( 2건) : 11백만원	완료

□ 금후계획

○ 항구복구 사업 완료 ----------------------------- 2011. 12.

북부권 국도대체우회도로 건설

○ 시가지 통과 국도 17, 27호선 교통량 분산으로 시내권 교통정체 해소

○ 북동부지역 지역개발 촉진 및 광역도시 발전기반 구축

□ 사업개요

○ 구    간 : 덕진구 용정동 ～ 완주군 용진면

○ 사업규모 : L=11.23㎞, B=20m(전주시 구간 : 8.4㎞)

○ 사 업 비 : 2,640억원(국비 2,432, 시비 208)

- 기   투   자 : 1,115억원(국비 982, 시비 133)

- 2011년 예산 : 시비 45억원(보상비), 국비 220억원(공사비)

○ 사업기간 : 2006 ∼ 2013(8개년)

○ 용지보상 : 전주시

○ 시 행 청 : 국토해양부(익산지방국토관리청)

□ 추진상황

○ 편입용지 570필지 465,811㎡중 409필지 381,652㎡ 보상완료

(보상율 82%)

○ 교량 6개소 1,755m 공사추진(공정율 57％)

□ 금후계획

○ 편입용지 보상완료 ------------------------------ 2012. 12.

○ 전체구간 공사 완료(개통) ----------------------- 2013. 12.

동서고속도로(새만금∼전주∼포항) 건설

○ 새만금에서 포항까지 동서축을 잇는 고속형 직통도로 건설

○ 동서간 교통체계를 개선하고 동서지역의 통합적 발전에 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 새만금 방조제 ∼ 김제 ∼ 전주

○ 규    모 : 연장 181.0㎞(새만금 ∼ 전주 : L=54.3㎞ 별도)

폭 23.4m(4차로)

○ 사 업 비 : 49,000억원(새만금 ∼ 전주 : 16,458억원)

- 기   투   자 : 10억원

- 2011년 예산 : 17억원

○ 사업기간 : 2010 ∼ 2020(11개년)

○ 시행기관 : 국토해양부(한국도로공사)

□ 추진상황

○ 국가기간 교통망 수정계획(’00~’19) 신규반영 - 2007. 11. 30.

○ 초광역경제권 사업(내륙벨트관련) 선정발표(균발위) - 2008. 12. 15.

- 내륙벨트(새만금~전주~무주~대구~포항 내륙연계) 고속도로 건설

○ 예비타당성조사 용역 완료(기재부, KDI) ------ 2010.  7. 14.

○ 타당성조사(17억원) 용역추진(국토부) - 2010. 12 ～ 2011. 12.

- 새만금 ~ 전주구간(L=54.3㎞) 우선추진 시행

○ 노선선정 의견 제출 --------------------------- 2011.  7.  7.

○ 사전 환경성 검토(초안) 주민설명회 개최 ------ 2011. 11.  4.

□ 금후계획

○ 타당성 조사 완료(국토해양부) -------------------- 2011. 12.

○ 기본 및 실시설계 용역(한국도로공사) - 2012.  2 ~ 2014. 12.

생 태 복 원 과  소 관

ꊱ	노송천복원 프로젝트	----	50
ꊲ	건산천 생태하천 조성사업	----	51
ꊳ	전주천 고향의 강 정비사업	----	52
ꊴ	덕적천 재해예방사업	----	53
ꊵ	중복천 개수공사	----	54
ꊶ	삼천 생태하천 복원사업	----	55
ꊷ	산성천 하천환경 정비사업	----	56
	삼천 하천기본계획수립 용역	----	57
	편안한 하천 산책로 정비사업	----	58
	빗물이용시설 설치 지원사업	----	59
	만경강 생태하천가꾸기사업(2단계)	----	60

노송천복원 프로젝트

○ 복개하천을 생태하천으로 복원하여 자연과 어우러진 수변공간 제공

○ 하천과 연계한 특화거리 등을 조성하여 구도심 활성화 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 시청 앞 광장 ∼ 진북동 한국은행

○ 사업기간 : 2008.  5 ∼ 2013. 12.

○ 사업규모 : 생태하천복원 L= 1,124m

○ 총사업비 : 32,734백만원(국비 22,050, 시비 10,684)

- 기 투 자 : 21,440백만원(국비 11,477, 시비 9,963)

- 2011년 :  1,093백만원(국비 1,000, 시비 93)

- 2011년 이후 : 10,201백만원(국비 9,573, 시비 628)

□ 추진상황(공정율 70%)

○ 1단계 생태하천복원 완료

- 중앙성당 ∼ 구.한양예식장 구간(L=200m) 완료 - 2010.  6.

- 구.한양예식장 ∼ 진북동 한국은행(L=494m) 완료 - 2011. 11.

○ 노송천 복원구간 “차없는거리” 지정요청 및 완산경찰서 심의완료

- 지정구간 : 좌안 - 중앙복권방 ∼ 그린주차장입구, L=140m

○ 노송천 상인회 추가보상금 협의 ------- 2011. 10.  5 ∼ 현재

- 추가보상기간 : 1개월, - 대상 : 39개상가  - 보상금액 : 129백만원

○ 2단계 사업계획 변경신청 및 승인(환경부) --------- 2011. 11.

- 위치변경 : 노송광장 ∼ 중앙성당, 384m ⇨ 팔달로 북문교 ∼

건산천 복개종점, 430m

- 기간변경 : 2007 ∼ 2011 ⇨ 2007 ∼ 2013

□ 금후계획

○ 2단계 실시설계용역 ----------------- 2011. 11 ∼ 2012.  6.

- 구간 : 팔달로 북문교 ∼ 건산천 복개종점, L=430m

※ 전북도생태하천복원심의위원회, 환경부 기술심의 및 주차장

시설결정 병행

○ 2단계 공사추진 ---------------------- 2012.  7 ∼ 2013. 12.

건산천 생태하천 조성사업

○ 쾌적하고 깨끗한 하천환경 조성으로 주민의 여가공간 확충

○ 하천의 생태계 보전을 통해 생명력 있는 하천으로 지속관리

□ 사업개요

○ 위    치 : 진북동 우성@ 뒤 복개종점 ∼ 전주천 합류지점

○ 사업기간 : 2010.  4 ∼ 2011. 12.

○ 사업규모 : 생태하천 조성 L= 870m

○ 사업내용 : 저수호안공 1,632m, 산책로 1,571m, 인도교 2개소

계단 8개소, 친수공간 및 여울조성, 식재공 등

○ 총사업비 : 4,980백만원(국비 4,350, 시비 630)

□ 추진상황(공정율 98%)

○ 전북도생태하천 복원심의위원회 심의 -------------- 2010.  2.

○ 환경부 승인 협의 -------------------------------- 2010.  3.

○ 토목공사 완료 ---------------------- 2010.  4 ∼ 2011. 11.

- 저수호안 자연석 쌓기(1,632m) 및 계단설치 완료(9개소)

- 기존 하수관로 정비 및 우수토실 설치완료

- 인도1, 2교 설치완료 및 개통(‘10. 11. 30)

- 진덕교 하단부 차집관로 매설(관경1,100m/m, L=164m) 완료

- 산책로 투수콘 포장완료(1,571m)

- 제방도로 안전휀스 설치완료(L=1,308m)

- 조경 식재착수 ---------------------------------- 2011. 10.

□ 금후계획

○ 조경공사 마무리(꽃창포 외 9종 73,500주) -------- 2011. 11.

※ 보도교 경관조명(2개소) : 노송천복원 2단계 금암교 외 1개교 경관사업포함 시행

전주천 고향의 강 정비사업

○ 고향에 대한 지역적 자긍심 고취, 쾌적하고 편안한 여가 및 생활공간을

제공하여 시민 공동체의식 함양에 기여

○ 지역명물로 지역경제 활성화에 기여하고 다시 찾고싶은 고향으로 기억

할 수 있는 계기 마련

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 동서학동 안적교 ～ 서신동 삼천합류점

○ 사업기간 : 2010 ～ 2015(6개년)

○ 사업규모

- 친환경 하천정비 및 생태하천 조성 9.8km

- 친수공간 및 역사․문화․관광 연계시설

- 스토리텔링을 통한 상징조형물 설치 1식 등

○ 사 업 비 : 39,000백만원(국비 23,400, 도비 7,800, 시비 7,800)

- 기 투 자 : 1,667백만원(국비 1,000, 시비 667)

- 2011년 : 3,000백만원(국비 1,800, 도비 600, 시비 600)

□ 추진상황

○ “고향의 강“사업 신청 ----------------------------- 2010.  1.

○ 시범사업 선정(국토부) --------------------------- 2010.  4.

○ 기본구상(안) 보고 국토해양부, 익산청, 전북도(2회) - 2011.  2 ~  3.

○ 고향의 강 추진협의회 자문(5회) ------------ 2011.  3 ~ 10.

○ 하천이용시민 설문조사 ------------ 2011.  5. 23 ~  5. 25.

○ 주민설명회(2회) ------------------ 2011.  6. 24 ~  6. 27.

○ 기본구상(안) 추진협의회 확정 ---------------- 2011. 10. 25.

□ 금후계획

○ 아트폴리스과 디자인 협의 ----------------------- 2011. 11.

○ 설계 적정성 검토 ------------------------------- 2011. 11.

○ 기본 및 실시설계용역 마무리 --------------------- 2011. 11.

○ 공사 발주 및 연차별 사업추진 ----------- 2011. 12 ～ 2015.

덕적천 재해예방사업

○ 삼천의 지류인 덕적천 상류 도시화로 우수 도달시간의 빨라짐과 홍수

단면의 부족으로 하천범람에 따른 상습침수로부터 주택 및 농경지

피해를 예방하여 주민의 생명과 재산을 보호하고 시민생활 편익증진

□ 사업개요

○ 구    간 : 평화동 동아현대아파트 ∼ 삼천 합류지점

○ 사업기간 : 2010 ∼ 2013(4개년)

○ 규    모 : 연장 1,562m, 폭 19 ～ 23m, 교량가설 5개소

○ 사 업 비 : 11,000백만원(국비 6,600, 도비 2,200, 시비 2,200)

- 2011년 예산 : 5,000백만원(국비 3,000, 도비 1,000, 시비 1,000)

□ 추진상황

○ 하천기본계획 및 실시설계용역 착수 --------------- 2010.  8.

○ 덕적천 재해위험지구 배수개선공사 착공 ----------- 2011.  2.

○ 행정절차 이행을 위한 공사 일시중지 -------------- 2011.  2.

○ 사전 환경성 검토 협의 --------------------------- 2011.  3.

○ 소방방재청 설계심의 ----------------------------- 2011.  5.

○ 전북도 하천기본계획 심의 및 고시 ---------------- 2011.  8.

○ 덕적천 사업시행고시 및 보상계획 공고 ------------ 2011.  8.

○ 덕적천 편입 토지 현장 분할측량 ------------------ 2011.  9.

○ 공사 일시중지 해제 -------------------------- 2011. 10.  7.

○ 보상금 사정결정 및 협의통지 --------------------- 2011. 10.

□ 금후계획

○ 토지 및 지장물 보상 협의------------------------- 2011. 11~

○ 교량 가설(2개소) -------------------------------- 2011. 12.

○ 사업 마무리 ------------------------------------- 2013. 12.

중복천 개수공사

○ 익산지방국토관리청 소관 만경강 수계치수 위ㆍ수탁사업

○ 재해예방과 친환경생태하천 조성으로 편안한 시민 생활공간 제공

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 삼천동 쑥고개길 ~ 효자동 삼천 합류점

○ 사업기간 : 2004 ~ 2012(9개년)

○ 사업규모 : 용지매입 및 하천개수 L=3.5㎞

- 보   상 : 토지 650필지 82,542㎡, 지장물 116건

- 호안 및 축제 5.7㎞, 교량 10개소, 보 3개소, 배수문 8개소 등

○ 총사업비 : 32,000백만원

- 기   투   자 : 20,415백만원(공사 8,882, 감리 948, 보상 10,585)

- 2011년 예산 : 4,717백만원(공사 3,035, 감리 282, 보상 1,400)

- 이후 소요예산 : 6,868백만원

□ 추진상황(총 공정율 70%)

○ 위․수탁공사 협약 체결(익산청⇔전주시) ----------- 2003.  6.

○ 하천기본계획 변경(효자2교 민원해소) - 2008.  5 ~ 2009.  4.

- 익산청 및 전북도 협의, 주민설명회, 심의 및 고시

○ 1 ~ 5차분 공사 완료 --------------- 2005. 10 ~ 2010. 12.

- 호안 및 축제 4.5㎞, 제방포장 0.8㎞, 교량 5, 보 3, 배수문 5개소 등

○ 공사(6차분) 및 감리(7차분) 착수 ----------------- 2011.  4.

○ 교량가설 2개소(중복3가교, 호남교) --------------- 2011. 10.

□ 금후계획

○ 호안 및 축제공 ---------------------------------- 2011. 11.

○ 제방 포장 및 6차분 준공 ------------------------- 2011. 12.

※ 잔여물량 호안, 축제공(200m), 교량 1개소 등 2012. 12 준공 예정

삼천 생태하천 복원사업

○ 수질개선 및 수생태계 복원을 통한 생태적으로 건강한 하천으로 복원

지역주민의 생태 휴식공간 제공

○ 반딧불이를 복원하여 인근 문화유산과 연계하여 생태관광자원으로

활용 지역경제 활성화에 기여하고 깨끗한 전주시 이미지 제공

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 평화2동 원당교 ~ 서신동 전주천합류점

○ 사업기간 : 2011 ~ 2014(4개년)

○ 사업규모 : 생태하천복원사업 11.0km(미추진 4km 중점추진)

○ 사 업 비 : 28,000백만원(국비 19,600, 시비 8,400)

- 2011예산 : 1,000백만원(국비 700, 시비 300)

□ 추진상황

○ 자연형하천조성사업 완료(삼천교 하류 7㎞) --- 2001 ~ 2007.

○ ’11년 신규 생태하천복원사업 신청 ----------------- 2010.  4.

○ 중기지방재정계획 반영 --------------------------- 2010. 12.

○ ’11년도 생태하천복원사업 예산내시(환경부 7억) --- 2011.  5.

○ 기본 및 실시설계용역 행정절차(계약심의, 용역심의) 이행 - 2011.  5.

○ 기본 및 실시설계용역 공사원가심사 완료(전라북도) - 2011.  6.

○ 기본 및 실시설계용역 착수 ----------------------- 2011. 10.

□ 금후계획

○ 생태하천복원 추진협의체 구성 협의 및 자문 ----- 2011. 12～

○ 사전환경성검토 협의, 실시설계 완료 - 2011. 12 ～ 2012.  4.

○ 공사 발주 및 연차별 사업추진 --------------- 2012 ~ 2014.

산성천 하천환경정비사업

○ 수해상습지 개선사업을 통하여 재해로부터 인명 및 재산피해를

예방하고 생태하천으로 조성하여 시민 휴식공간 제공

○ 수생태 회복과 수질개선은 물론 도시온도 저감으로 쾌적한 녹색

생활공간 제공 및 새만금 수질개선 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 동서학동 삼경사 부근 ～ 전주천 합류점

○ 사업기간 : 2011 ～ 2014(4개년)

○ 사업규모

- 수해상습지 개선 및 친환경하천정비 2.3km

- 하천정비(확장) 5~6m ⇨ 12m

○ 사 업 비 : 12,350백만원(국비 7,410, 도비 2,470, 시비 2,470)

- 2011년 : 1,000백만원(국비 600, 도비 200, 시비 200)

□ 추진상황

○ 하천정비 기본계획 수립 -------------------------- 2007.  4.

○ 지방하천 환경정비사업 선정(국토해양부) ---------- 2011.  2.

○ 2011년도 사업예산 내시 및 보조금 송금 ---------- 2011.  3.

○ 용역과제 심의(적정) ----------------------------- 2011.  5.

○ 설계용역 원가심사 완료(전북도) ------------------ 2011.  6.

○ 기본 및 실시설계용역 착수 ----------------------- 2011. 10.

□ 금후계획

○ 사전환경성검토 협의 및 실시설계    ---------- 2012.  4. 30.

○ 토지 및 지장물 보상 ------------------------ 2011 ~ 2012.

○ 공사 발주 및 연차별 사업추진 ----------- 2012.  5 ～ 2014.

삼천 하천기본계획수립 용역

○ ’85년 기본계획수립 이후 장시간이 흐르고 택지개발 등 도시발전에

따른 유역 여건 변화로 하천관리를 위한 기본계획 재정비가 필요하여

○ 하천법 제25조 규정에 의거 기본계획을 재수립하여 하천에 관한

종합적인 정비, 보전, 이용이 되도록 하는데 있음

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 평화2동 완주군과의 시경계 ～ 전주천 합류점

○ 사업기간 : 2011. 10 ～ 2012.  5.

○ 용역개요

- 하천기본계획수립 및 하천관리대장작성 용역 10.97km

- 하천시설관리대장 작성(제방 및 호안현황)

- 하천현황 관리대장 작성(하천구역, 하천예정지 현황 등)

- 하천시설관리대장 전산화

○ 사 업 비 : 493백만원(도비 150, 시비 343)

□ 추진상황

○ 삼천 하천기본계획수립 변경신청 ------------------ 2010. 12.

※ 하천정비 기본계획 수립(당초) ------------------ 1985. 11.

○ ’11년도 지방하천기본계획수립 대상하천선정(전북도) - 2011.  3.

○ 용역과제 심의(적정) ----------------------------- 2011.  5.

○ 설계용역 원가심사 완료(전북도) ------------------ 2011.  6.

○ 용역 착수 --------------------------------------- 2011. 10.

□ 금후계획

○ 하천기본계획수립 용역 시행 --------- 2011. 10 ～ 2012.  4.

○ 지방하천 심의위원회 심의 및 고시 ---------------- 2012.  5.

편안한 하천 산책로 정비사업

○ 산책로 보수, 정비 등 유지관리와 계단, 징검다리, 안내판 설치 등으로

시민 모두가 보다 편안하고 안전한 산책환경에서 활동 기대

○ 시민들의 여가 및 생활공간으로 정착하고 있는 도심하천내 균형있는

운동 및 편의시설 배치로 시민들의 편안한 여가공간 제공

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주천, 삼천, 아중천 등

○ 사업기간 : 2011.  2 ~ 12.

○ 사 업 비 : 770백만원(시 500, 완산 135, 덕진 135)

○ 사업내용 : 산책로 보수･보강, 운동기구 및 편의시설 개선 등

□ 추진상황(공정율 96%)

○ 하천 산책로 이용시민 불편사항 일제조사 --------- 2011.  2.

○ 하천 산책로 및 편의시설 등 정비 ---------------- 2011.  3~

- 하천 산책로 진･출입로 정비 11개소, 쉼터조성 1개소

- 운동기구 정비 4개소, 거리표지판 정비 80개소, 안전휀스 설치 157m

- 삼천 이수보 일원 산책로 신설 80m, 제방정비 106㎡

- 수달보호 안전시설 설치 128m

□ 금후계획

○ 하천 산책로 및 편의시설 지속 정비 추진 ---------- 2011. 12.

- 삼천 산책로 신설(삼천교 일원 440m)

- 징검다리 설치 1개소, 운동기구 정비 4개소 등

※ 대대적인 산책로 정비는 공약사업으로 추진

전주천 ⇨ 2012 ~ 2013,     삼천 ⇨ 2012 ~ 2013

빗물이용시설 설치 지원사업

○ 빗물을 재이용함으로써 물 부족에 대한 선제적 대응기반을 마련하고

○ 빗물의 효율적 이용으로 수자원 보전과 재해예방 및 환경보전에 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 관내

○ 사업기간 : 2011.  1 ~ 12.

○ 사업규모 : 빗물이용시설 6개소(설치비 지원)

○ 사 업 비 : 60백만원(공공기관 15백만원, 개인 10백만원 이내)

□ 추진상황

○ ’11년도 지원사업 추진 협의(그린스타트전주 정책위원회) - 2011.  3.

○ 빗물이용시설 심사 및 선정(그린스타트전주 빗물소위원회) - 2011.  4.

○ 보조금 교부결정 6개소(공공기관4, 어린이집1, 개인1) - 2011.  6.

○ 사업포기서 제출(덕진중학교11백만원, 개인7백만원) - 2011. 10.

○ 사업 완료(2개소 - 22백만원 지원) --------------- 2011. 10.

○ 사업 추진(2개소 - 20백만원) -------------------- 2011. 10.

○ 추가 접수(오송중학교 11백만원, 개인 7백만원) ---- 2011. 10.

○ 보조금 결정 및 교부통지(2개소) ------------------ 2011. 10.

□ 금후계획

○ 사업진행 4개소 공사마무리(38백만원 지원) --- 2011. 11. 30.

○ 시민운동으로 확산될 수 있도록 홍보강화 -------------- 연  중

만경강 생태하천 가꾸기사업(2단계)

○ 쾌적하고 편안한 생활공간 조성으로 삶의 질 향상 기여

○ 전주천과 삼천을 연계한 생태하천 조성으로 수질개선 향상

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 팔복동 ~ 만경강 합류점

○ 사업기간 : 2004 ~ 2015(11개년)

- 1 단 계 : 2004 ~ 2010(7개년)

- 2 단 계 : 2013 ~ 2015(3개년)

○ 사업규모

- 1 단 계 : 탐방로 13.9km, 생태학습장 1개소

- 2 단 계 : 가동보 4개소, 생태습지 조성 1식

○ 사 업 비 : 23,860백만원(국비 16,666, 시비 7,194)

- 1 단 계 : 10,360백만원(국비  7,216, 시비 3,144)

- 2 단 계 : 13,500백만원(국비  9,450, 시비 4,050)

□ 추진상황

○ 1단계(1~8차분) 공사완료 ---------- 2004. 11 ~ 2010. 12.

○ 2단계 신규사업 신청 ----------------------------- 2011.  4.

○ 국비반납(161백만원) ----------------------------- 2011.  5.

※ 2011예산(시비 69백만원) 1회추경 삭감

□ 금후계획

○ 신규사업 선정협의(환경부) ----------------------- 2012 ~

○ 용역과제 심의 등 행정절차 이행 ------------------ 2013.  1.

○ 실시설계용역 발주 및 착수 ----------------------- 2013.  4.

○ 실시설계용역 ------------------------------------ 2013. 10.

○ 공사 발주 및 연차별 사업추진 --------------- 2013 ~ 2015.

차량등록사업소 소관

ꊱ	시민이 체감하는 친절봉사봉사행정 구현	----	62
ꊲ	자동차 무상점검의 날 운영	----	63

시민이 체감하는 친절 봉사행정 구현

○ 직원 친절도 향상으로 시민의 기대수준에 걸맞는 친절봉사 실천

○ 민원인 편의를 도모하고 민원 행정의 투명성 및 신뢰성을 확보하여

시민에게 행복을 주는 수요자 중심의 행정 구현

□ 사업개요

○ 자동차 및 건설기계 등록현황 : 251,694대

- 자동차등록대수 : 244,703대

- 건설기계등록대수 :   6,991대

○ 민원처리건수 : 868,555건(1일평균 : 4,620건)

○ 쾌적한 청사 환경 조성

□ 추진상황

○ ONE-STOP 민원처리로 주민 편의 제공

- 자동차등록업무와 관련된 타 기관 사업소내 입주 운영

․지방세 부과(구청)․수납(전북은행)․지역개발공채(농협)

○ 민원안내 근무자 배치 : 청경 2명, 자원봉사자 11명

○ 민원인을 위한 편의시설 설치 및 환경정비

- 인터넷․주차장 카스토퍼 설치, 화장실 정비

○ 신속․정확한 전화 안내 및 민원편익증진을 위한 「자동차 등록업무

안내책자」작성 배부 : 500부

- 시․구․동 민원실 비치 및 자동차 매매상사 등 관련기관 배부

○ 직원 친절교육 및 업무연찬 실시 : 10회

□ 금후계획

○ 민원인 편의제공 및 친절행정을 위한 쾌적한 환경조성 유지

○ 직원 친절교육 및 업무연찬, 자원봉사자 차량 관련 교육 실시

자동차 무상 점검의 날 운영

○ 날로 수요가 급증하는 차량소유 민원인에게 무상점검 서비스를

제공하여 만일의 사고를 미연에 방지하고자 함

□ 추진개요

○ 주    관 : 차량등록사업소, 자동차서비스 센터 2개사

○ 기    간 : 2011.  3 ~ 12.

○ 장    소 : 차량등록사업소 주차장

○ 참여차량 : 년간 300여대

○ 내    용

- 차량등록사업소 내방 민원 차량을 대상으로 실시

- 엔진, 제동장치, 조향장치, 에어컨, 타이어 공기압 등 점검

□ 추진상황

○ 무상점검서비스 실시 : 5회 256대

○ 무상점검서비스 지원 : 현대자동차 서비스, 기아자동차서비스

○ 무상점검서비스 내용 : 제동장치, 에어컨, 타이어, 배터리작동 상태 등

○ 무상점검서비스 홍보 : 홈페이지 게재 및 홍보문안 게첨 등

□ 금후계획

○ 겨울철 안전운전을 위한 동절기 대비 무상점검 서비스 실시

○ 자동차 자가점검 및 동절기 자동차 관리 안내