제305회 전주시의회 제2차정례회

2013년도 행정사무감사특별위원회

2013년도

주요업무 추진상황 보고

맑은물사업소

보   고   순   서

□	일 반 현 황		-------	1
□	부 서 별 주 요 기 능		-------	2
□	기 본 현 황		-------	3
□	주요업무 추진상황		-------	6
	○	수 도 행 정 과	-------	6
	○	급 수 과	-------	9
	○	수 질 관 리 과	-------	17
	○	하 수 과	-------	22

일   반   현   황

□ 기   구 : 4개과 14담당

									맑은물사업소
	수도행정과 (4담당)							급 수 과 (4담당)							수질관리과 (3담당)								하수과 (3담당)
	수도행정							맑은물공급							수질관리								하수행정
	완산요금							급수시설							수질분석								하수시설
	덕진요금							누수방지							생산관리								하수정비
	체납징수							계량기관리

※ 전산실, 누수신고센터, 계량기시험소, 사업장 13개소(취수장 2, 배수지9, 정수장2)

□ 정‧현원

부 서 직 급		정 원	현 원
			계	수도행정과	급 수 과	수질관리과	하 수 과
합 계		92	90	22	25	31	12
일반직	소계	55	54	13	15	15	11
	4급	1	1	1
	5급	4	4	1	1	1	1
	6급	14	14	5	4	2	3
	7급	23	25	6	5	11	4
	8급	8	5		4		3
	9급	5	5		1	1
연 구 사		4	3			3
기 능 직		33	33	9	10	13	1

부서별 주요기능

과 별	분 장 사 무
수도행정과	○ 맑은물사업소 운영 총괄 ○ 상수도공기업특별회계 운영 ○ 공사 및 용역계약, 물품관리 ○ 상하수도사용료 과징업무 전반 ○ 상수도요금 인상 및 조례 개정 ○ 검침업무 관리 ○ 상하수도 급수전 관리 및 수도 단속
급 수 과	○ 상수도 전면개량을 통한 맑은물 공급사업 ○ 상수도 중장기계획 수립․시행 ○ 비상급수계획 및 대책수립 총괄 ○ 급수공사, 상수도 증설 및 확장공사 ○ 간이상수도 유지관리업무 ○ 누수탐사 및 누수복구업무 및 누수방지대책 수립 ○ 누수신고센터 운영관리 ○ 급수중지․개전․폐전에 따른 계량기 관리 ○ 고장․노후계량기 교체관리 ○ 계량기시험소 운영관리
수질관리과	○ 생활․공업용수 등 원․정수 확보 및 생산 ○ 광역상수도 수요에 따른 수급조절 및 관리 ○ 각 사업장 구축물․건물 유지보수 및 안전관리 ○ 국가공인수질검사기관 적정운영 및 정도관리 ○ 먹는물 공동시설(약수터) 및 간이상수도 수질검사 ○ 상수도 원․정수 수질관리 및 보전 ○ 상수원보호구역 관리
하 수 과	○ 하수도정비 기본계획 수립 ○ 하수도공기업특별회계 운영 ○ 효율적인 지하수 및 물 재이용 관리 ○ 하수관거 정비사업 ○ 하수관거정비 민간투자(BTL)사업 유지관리 ○ 마을하수도 시설 및 유지관리 ○ 하수처리장 운영관리 및 시설물 유지관리 ○ 하수찌꺼기(슬러지) 처리시설사업 ○ 총인(T-P) 처리시설사업 ○ 새만금유역 CSOs 및 초기우수 처리시설사업

기   본   현   황

□ 급수인구

총인구 (명)	급수인구 (명)	보급율 (%)	1일 1인 급수량(ℓ)	급수전	유수율 (%)	무수율 (%)	비고
654,625	652,006	99.6	365	211,000	69.9	30.1

※ 공업용수 미포함

□ 수계별 생산 및 급수구역

구 분			시설용량 (천㎥/일)	급수량 (천㎥/일)	급 수 구 역	급수인구	비율 (%)
총 계			377	280		652,006	100
생활용수	합 계		307	243	33개동	652,006	100
	자체상수도	대 성	40	15	서서학동 일부, 중화산1 일부, 완산동 일부, 효자1일부, 평화1.2일부	40,248	6.2
	광역상수도	전주권	267	228	중앙,풍남,노송, 서신, 동서학동, 서서학동 일부, 삼천1. 2. 3, 중화1일부, 중화2, 평화1.2일부, 진북 효자1일부. 2. 3. 4, 인후1.2.3, 금암1.2, 덕진, 우아1.2, 호성, 팔복, 송천1.2, 조촌, 동산	611,758	93.8
공업 용수	팔복정수장		70	37	팔복동 1, 2산단(19개 업체 공급)

※ 생활용수 급수구역은 생산량 및 수요량에 따라 조절

□ 도․송․배․급수관

〔단위 : ㎞〕

총 연 장	도․송수관	배 수 관	급 수 관	비 고
2,519	61	856	1,602

□ 상수원 보호구역

상수도사업장	보 호 구 역			구역지정일	보호시설
	면적(㎡)	상류(m)	하류(m)		안내판	표주
계	614,111	1,500	800		16	50
방수리취수장	284,775	1,000	500	‘72. 5. 5.	8	26
전미취수장	329,336	500	300	‘67. 8. 5.	8	24

□ 상수원 수계별 『댐』 저수량

수 원	위 치	만수량(천㎥)	관리기관	비 고
용 담 댐	진 안 군	815,000	수자원공사	전주권광역

□ 하 수 도

구 분		처리구역 (㎢)	계획연장 (㎞)	시설연장 (㎞)	미시설연장 (㎞)	보급율 (%)	비고
계		54.97	2,392	8,075	640	71.6
합 류 식			566	566		100.0
분류식	소 계	54.97	1,826	7,509	640	62.8
	오수관거		902	7,025	200
	우수관거		924	484	440

□ 차집관로

하 천 명	연 장 (㎞)	맨 홀 (개)	우수토실 (개소)	환기구 (개소)	여수토실 (개소)
계 (6개노선)	88.9	1,010	251	73	5
전주천 (좌, 우안)	23.5	369	142	37	4
삼 천 (좌, 우안)	15.4	155	45	18
금암천 (좌, 우안)	4.4	82	38	9
아 중 선	12.0	174	16	4
팔복선(공장,생활)	16.9	183	8	5	1
상 관 라 인	10.4	47	2
기 타	6.3

□ 하수․위생처리 시설

구 분	하 수 처 리	위 생 처 리
위 치	덕진구 송천동 2가 1035번지
시설용량	1일 처리능력 ⇨ 403,000㎥ - 1단계 시설 : 113,000㎥ - 2단계 시설 : 190,000㎥ - 3단계 시설 : 100,000㎥	1일 처리능력 ⇨ 290㎘ - 분 뇨 : 30㎘ - 정 화 조 : 260㎘
처리방법	1․2단계 고도처리(CNR)공법 3단계 고도처리(CSBR) 공법	하수 연계처리(1994년부터 시행)

수도행정과  소 관

□	누수없는 상하수도 사용료 부과	----	7
□	체납 상하수도 사용료 징수율 제고	----	8

누수없는 상하수도 사용료 부과

○ 검침 부과자료의 철저한 관리로 누수없는 과징체계 확립

○ 시민편익시책 제고 및 친절행정 강화로 신뢰받는 수도행정 구현

□ 사용료 부과 현황

(단위 : 억원)

구 분	부 과 액		’11년 요금인상
	’12년 10월말	’13년 10월말
합 계	745	760	상수도 10월 18.36% 하수도 8월 113%
상 수 도	539	550
하 수 도	206	210

※ 매월 21만건 검침 후 상․하수도, 음식물처리수수료, 물이용부담금 포함 납부 고지

□ 추진상황

○ 수용가 기본자료(주소, 성명) 정비 : 46,220건

○ 자동납부 중지 수용가 안내문 발송 : 2,290건

○ 업종변경 등 상수도 요금 추징 : 212건 854천원

○ 직원 및 검침원 친절교육 실시 : 19회

○ 생생리포터 검침현장 출장 및 민원처리 : 61건

- 저소득층 수도 수리, 검침 장애요인 해소 등

□ 금후계획

○ 휴면수용가 일제점검 실시(연중)

- 중지, 폐전 대상 수용가 계량기 철거 및 구관막기로 누수 사전예방

○ 다량급수업소 일제점검 실시 : 487개소(300톤 이상 급수업소)

○ 상수도 업종 조사(연중)

○ 원룸 신축지구 등 상수도 부정급수 상시 단속(연중)

체납 상 ․ 하수도 사용료 징수율 제고

□ 사용료 징수현황

(’13.10.31현재/단위:백만원)

구 분 연 도		조정액	징수액	결손액	체납액	징수율	비고
계		57,629	54,878	242	2,509	95.23%
상수도	현년도	54,751	52,820	0	1,931	96.47%
	과년도	2,878	2,058	242	578	71.51%
계		22,051	21,104	48	899	95.71%
하수도	현년도	21,043	20,316	0	727	96.55%
	과년도	1,008	788	48	172	78.15%

□ 추진상황

○ 고질․고액 체납요금 집중징수기간 운영 : ’13.1～3월,7~8월(5개월)

- 10만원이상 체납액 징수 : 39.4억원

○ 체납요금 특별징수기간 운영 : ’13.4 ～6월,9~11월(6개월)

- 체납단수반 확대운영 : 2반 4명 ⇒ 4반 8명(기간제 투입)

- 징수실적 : 56.9억원(현년도 47.5 / 과년도 9.4)

※ 전년 동기간보다 442백만원 초과징수

○ 아파트, 원룸, 0톤 수용가 등 테마별 징수독려 : 41회

○ 체납단수 전 정수처분 계고장 교부

- 우편고지 :  2회  7,015세대  30억원

- 방문교부 : 47회  8,106세대  41억원

○ 체납자 재산압류 : 3명 71백만원(압류예고 : 42명 2억원)

○ 고질․고액 체납수용가 단수처분 추진

- 단수 1,363개소 7.8억원 (개전 1,235개소 7.1억원 징수)

※ 2012년 단수실적 : 865개소 8.4억원

○ 체납자정보 D/B구축자료 관리 : 40,647건 입력 및 정비

□ 금후계획

○ 동절기 고질․고액 체납요금 집중징수기간 운영 : ’12.12월～’13.2월(3개월)

○ 장기고액 체납자에 대한 단수, 체납처분 등 행정조치 강화

○ 체납요금 조기납부 및 당월분 납기내 납부 홍보활동 강화

급  수  과  소 관

□	상수도 전면개량을 통한 맑은물 공급사업	----	10
□	팔복배수지 건설 및 혁신도시 상수도 공급사업	----	11
□	고지대 급수난 해소를 위한 지곡배수지 건설	----	12
□	노후관 교체 ․갱생 및 통합공사	----	13
□	긴급 누수복구 및 누수탐사	----	14
□	학교 등 맑은 수돗물 공급사업	----	15
□	신속하고 완벽한 상수도 계량기 관리	----	16

『상수도 전면개량을 통한』맑은물 공급사업

○ 시민의 건강증진과 삶의 질 향상을 위해 노후관 개량 및 상수도

급수체계 전반에 대한 개선 필요

□ 사업개요

○ 사업기간 : ’09년 3월 ~ ’16년 12월

○ 총사업비 : 1,612억원(특별회계 721, 일반회계 400, 지방채 491)

＊’13년 예산 208억원(특별회계 108, 일반회계 50, 지방채 50)

○ 사업규모

- 블록안정화 128개 블록(전면개량 50, 블록고립 78)

- 통합관리센터 신축 및 선진 관망관리시스템 구축 1식

- 상수도관 개량 703km, 노후계량기 교체 40,201전

□ 추진상황

○ 공사착공 : ’09. 3. 24

○ 상수도관 교체 및 신설 470㎞ (※ 전체물량 703km)

○ 블록시스템 구축 92개소 추진중(정비 블록 40, 블록 고립 52)

○ 유수율 제고 : ’08년 61.3% → ’13년도 9월말 69.9%(증 8.6%)

□ 금후계획

○ ’14년 목표공정(’13년 67% ⇒ 82%)

- 관로공사 110km

- 블록정보화시스템 구축(통합관리센터 내) : 수압, 유량, 수질측정 등 감시 및 제어

- 간접배수 전환(10개 배수지 활용)으로 적정 수압 유지

- 전면개량블록 집중투자를 통한 유수율 제고 및 균등수압 확보

○ 공사 마무리	’15. 11월

○ 성과보증 및 준공	’15. 11월 ~ ’16. 12월

※ 전면개량 50개 블록 유수율 85% 이상

팔복배수지 건설 및 혁신도시 상수도 공급사업

○ 기존 광역송수관 직접 공급지역을 배수지를 통한 간접 공급방식으로 전환

○ 혁신도시, 법조타운, 유통단지, 첨단산업단지 등에 안정적 용수 공급

□ 사업개요

○ 사업기간 : ’09. 6월 ～ ’14. 05월

○ 사 업 비 : 263억원(국비 93억, 시비 170억) ＊’13년 10억원

○ 위    치 : 전주시 덕진구 팔복동․만성동 일원

○ 사업규모

- 배수지 34,500㎥(생활용수 30,000, 공업용수 4,500)

- 송․배수관 매설 L=7.7㎞(송수관 5.1, 배수관 2.6)

□ 추진상황

○ 『팔복배수지 건설』 : 공정 100%

- 송･배수관매설 완료(L=3.9㎞),  배수지 구조물 구축 완료

○ 『혁신도시 배수관 포설』 : 공정 70%

- 송･배수관매설(L=3.8㎞중 2.2㎞완료), 대로1-16호선 제외 매설완료

□ 금후계획

○ 대로 1-16호선(만성지구 택지개발사업)의 개설지연(’14년 예정)에

따라 혁신도시로 인입되는 상수관로 매설 곤란

➪ 상수도 임시 공급라인(D200mm, D150mm)으로 ’13년까지           수돗물공급 지장 없도록 추진

○ 혁신도시 배수관 포설완료	’14. 05월

○ 팔복배수지를 통한 혁신도시 통수 개시	’14. 06월부터

고지대 급수난 해소를 위한 지곡배수지 건설

○ 평화동, 서서학동 등 고지대 지역의 급수불출 민원 해소하고

배수지 건설로 안정적 생활용수 공급

□ 사업개요

○ 사업기간 : ’11. 5월 ～ ’13. 11월

○ 위    치 : 완산구 평화동 2가 산 104-4번지 일원

○ 사업규모 : 배수지 건설(생활용수 15,000㎥), 가압장 신설(30,000㎥/일)

○ 사 업 비 : 135억원(시비 113억, 지방채 22억) ＊’13년 40억원

□ 추진상황

○ 지곡배수지 건설사업 추진(공정 100%)

- 기존 정수장시설 및 취수장시설 철거 완료

- 배수지 구조물 구축 및 가압장 시설개량

- 송․배수관로 교체완료 : D500~600mm L=1.4km

- 진입도로 아스콘 포장 및 상부 조경 식재, 시설물 설치 완료

□ 금후계획

○ 사업 준공	’13. 11월

○ 지곡배수지 및 가압장 시험가동	’13. 12월

노후관 교체·갱생 및 통합공사

○ 노후로 누수 및 적수가 발생되는 관로를 교체 및 갱생하여 유수율 향상

○ 급수 다발관 정비로 안정적인 급수체계 구축 및 관망 관리 효율 도모

□ 사업개요

○ 기    간 : ’13. 3월 ~ 7월

○ 위    치 : 전주시 완산구 삼천동 등 4개소

○ 사 업 비 : 3.6억원(교체 2억, 갱생 1억, 통합 0.6억)

○ 사업내역

구 분	교 체(2건)	갱 생(1건)	통 합(1건)
위 치	완산구 삼천동, 평화동 (송정3길, 구이로)	완산구 효자동 (세내길)	덕진구 우아동 (우아5길)
사업규모	L=865m (D=80~150mm)	L=145m (D=300mm)	L=210m (D=50mm)
매설년도	1983년 매설 CI 주철	1986년 매설 CI 주철	급수선 정비 순환망 구축
사 업 비	2억원	1억원	0.6원원

□ 추진상황

○ 노후관 교체공사 완료(구이로 등 2개소)	’13. 3월 ~ 6월

○ 세관 갱생공사 완료(세내로)	’13. 5월 ~ 6월

○ 통합공사 완료(우아5길)	’13. 5월 ~ 7월

□ 금후계획

○ 노후관 교체 및 갱생 사업지 조사	’13. 8월 ~ 12월

긴급 누수복구 및 누수탐사

○ 상수도 관로에서 발생하는 돌발적 누수를 효율적으로 긴급복구

함으로써 누수로 인한 예산낭비 방지 및 시민불편 해소

□ 노후관 현황

(단위 : ㎞)

계	5년이하	10년이하	15년이하	20년이하	20년 초과
2,327	485	194	277	276	1,095

※ 노후관(16년이상) 1,371km(59%) ⇒ 맑은물 공급사업 준공후 862km(37%)

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 전 급수구역(맑은물공급사업 정비구역 제외)

○ 사 업 비 : 5.5억원(긴급누수복구 5.2억, 누수탐사 0.3억)

○ 추진방법

- 누수민원 ┏ 단가업체 처리

┗ 자체 처리(누수 수리원 10명)

- 누수탐사 ┏ 용역 탐사

┗ 자체 탐사(탐사반 3명)

□ 추진상황

○ 누수민원처리 : 2,812건

- 단가업체 처리 : 도로누수 등 166건 / 4.5억원

- 자체처리 : 앵글밸브 교체 등 2,746건

○ 누수탐사 추진 : 72개소

- 자체 탐사 : 29개소

- 용역 탐사 : 43개소

□ 추진계획

○ ’13년 긴급누수복구 및 누수탐사 추진 : 연중

학교 등 맑은 수돗물 공급사업

○ 노후 옥내 급수관의 세척․갱생 또는 교체에 필요한 비용의     일부를 지원하여 맑고 깨끗한 물을 공급하고 시민 건강증진에     기여

□ 사업개요

○ 기    간 : ’10년 ~ ’14년(5개년)

○ 사 업 비 : 8억원(’13년 1.5억원)

○ 지원대상 : 학교, 공동주택, 사회복지시설, 수급자 주택 등

- 배관의 내부가 부식되어 수질기준을 초과하는 경우

○ 지원근거 : 전주시 상수도 급수조례 제 39조(급수설비의 관리 책임 등)

○ 지원범위

지원대상	지원범위	지원금액	비고
학 교 및 복지시설	총 공사비 70% 이하	최대 20백만원
공동주택	총 공사비 50% 이하	최대 30백만원	100세대미만 10백만원 200세대미만 20백만원 200세대이상 30백만원
일반주택	총 공사비 50% 이하	최대 30만원
기 초 수 급 자	전 액	최대 2백만원

□ 추진상황

○ ’13년 상반기 지원대상자 선정 및 추진	’13. 5월~11월

- 공동주택 : 동신3차, 성결, 남양대명, 광진산업,

- 복지시설 : 가나안복지재단

○ ’13년 하반기 지원대상자 선정 및 추진	’13. 9월~12월

- 공동주택 : 평화동 코오롱, 삼성맨션

□ 금후계획

○ 급수설비 지원사업 공사 시행(자체) 및 지원금 지급완료	’13. 12월

신속하고 완벽한 상수도 계량기 관리

○ 유효만기․고장 계량기의 완벽한 교체를 통해 계량의 품질 향상을      도모하고 계량기 고장 및 동파 등 예방조치 강화로 신뢰성 향상

□ 사업개요

○ 사 업 비 : 5억원

○ 사업규모 : 21,000개 교체(총 수도전 211,000전의 10%)

□ 추진현황

○ 계량기 교체	22,967개(109.3%)

- 유효만기 19,273개 / 고장 3,694개

(자체인력 8,300,  일반업체 8,167,  맑은물공급사업 6,500)

○ 불량계량기 색출을 위한 고장계량기 성능시험	4,841개

- 구입계량기 3,659개 / 노후․고장 1,042개 / 민원시험 140개

○ 동절기 대비 수도계량기 동파관리 추진

- 보온비닐커버 제작구입 27,000매 / 홍보물 인쇄 40,000매

□ 금후계획

○ 유효만기 및 고장 계량기 교체	600개 정도

○ 불량계량기 색출을 위한 계량기 성능시험	300개 정도

○ 계량기 동파예방 홍보 및 관리

- TV자막, 홍보전단지, 홈페이지, 시정소식지, 기상청 일기방송 등      - 동절기 사전 보온조치 : 보온재 충전, 동파방지 비닐커버 설치 등

- 비상대책 상황실 운영 및 단계별 대응, 발생즉시 복구 계획

수질관리과  소 관

□	상수도 전면광역화 대비 수질 안정성 구축	----	18
□	「먹는 물 관리 선도」수질검사기관 역할 강화	----	19
□	대성 정수장 정수지 내부개량	----	20
□	2013 상수도 취․정수 시설 유지관리	----	21

상수도 전면광역화 대비 수질 안전성 구축

○ 상수도 수질 감시시스템에 시민참여 확대 등 수질사고 대응․      수습시스템 강화를 통하여 2014 생활용수 전면광역화 운영의

안정성 확보

□ 사업개요

○ 지방상수도 취․정수 및 급수과정의 ‘위험요소’ 대응체계 철저 운영

- 방수리 상류 오염원 유입 및 태풍, 장마, 정전, 한해 등에 적정 대응

○ 광역상수도 원․정수관리 및 공급과정 안전성 검증과 제어 강화

-「용담호 수질변화 대책」연중 공동 추진(녹조, 전도, 망간검출 등)

○ 먹는 물 수질감시․제보․제안 시민참여 활성화

- 상수도 및 약수, 다수인 음수시설의 수질관리행정 시민참여 확대

□ 추진상황

○『수질위험 대처능력 함양 모의훈련』실시 …… 2회(3, 9월)

○ 대성수계 상수원 오염원 합동점검[환경청&전주시&진안·임실군] … 6월

○ 광역상수도 감시체계 강화

- 용담호, 고산정수장 월 1회 이상 현지점검(원수상태, 정수처리공정 등)

- 수질검사 항목 및 주기에 관한 규정을 자체 강화하여 연중 시행

○ 수돗물의 안전성을 시민생활현장에서 적극 홍보

- 초․중학교(104개소) 및 월 150개소 세대 방문 품질검사 및 상담

○ 연중 수질악화 우려시기 특별 수질관리체제 운영   …… 7 ～ 9월

□ 금후계획

○ 수자원공사와 위기대응 MOU 체결․운영  : ’13. 11 ～ 12월

○ 신설 배수지(지곡, 팔복) 실시간 수질 자동측정기 설치 : ’13. 12월

※ 소규모 4개 배수지 수질측정기 설치 및 데이터 통합운영( ’14. 4월)

「먹는 물 관리 선도」수질검사기관 역할 강화

○ 먹는 물 안전성이 취약할 수 있는 사회계층을 대상으로 진단 및 개선

※ 공인 먹는물 검사기관 맑은물사업소 ☞ 2000. 7 국립환경과학원 승인

- 분석결과 법적효력 및 수도사업자(시장) 검사의무 자체이행․수익사업 운영 자격

□ 사업개요

○「시민 먹는 물 안전성 확보 행정서비스」역점 추진, 사회복지 기여

- 사회․경제적 약자 음용수 안전성 확보노력을 통한 수돗물 불신해소 추진    ○ 도내 타 공인 검사기관(4개소/대학･민간기관) 검사유치 경쟁 심화

- 수입 유지 노력과 ‘시민 먹는 물 행정서비스 확대’ 중점 추진

□ 추진상황

○ 지하수 음용 및 정수기 사용세대 방문, 검사 및 상담(372개소)

○ 초·중학교 먹는 물 진단, 부적합 11/104개소 개선 조치[초등 67, 중등 37]

※ 지하수, 정수기의 일반세균 기준초과 조치 설명 및 수돗물 음용 권고

○ 2013 전국 검사기관 분석능력 평가 “만점기관” 선정

○ 법정 지하수 검사대상 출장채수(120여건/17백만원) 및 시·군 홍보

□ 금후계획

○ 고등학교 등 무료검사대상을 확대하고 그간 부적합 개소에 대한 재검사

○ 법규강화 적정 대응 및 대외 공신력 확보로 공인기관의 건실한 운영

대성 정수장 정수지 내부개량

○ 정․배수지 내부 부식현상에 따른 누수 및 2차 수질오염 방지를      위하여 배수지 개량사업 연차계획 수립, ’09년부터 추진 중

※ 배수지 저장된 수돗물의 염소, 응집제 등 정수약품 영향으로 기존 도료 용해,

수돗물의 색도 변화(청색화) 및 내부 구축물 들뜸, 부식 현상의 대책 추진

□ 사업개요

○ 총 사업기간 : 2009 ～ 2013년(5개년)

○ 사 업 량 : 40,688㎡ / 광역상수도 배수지(3개소) 및 대성 정수지

○ 사 업 비 : 2,602백만원 (기 투자 2,352백만원, ’13년 250백만원)

□ 그간 추진상황

○ ’09∼’12 내부 부식 및 시설물 노후화 정도에 따라 순차적 개량

- 대성정수지 총 2개지 중 1개지 개량	’09 / 186백만원

- 인후배수지 총 4개지 개량	’09～’10 / 784백만원

- 천마배수지 총 4개지 중 2개지 개량	’11 / 434백만원

- 천마(2개지) 및 효자배수지(총 2개지) 개량	’12 / 948백만원

○ 2013년도 잔여 배수지 개량사업대상 마무리

- 대성정수장 정수지(잔여1지) 개량 완료 : 154백만원(A=2,119㎡)

- 팔복정수장 고구배수지 내부개량 완료 : 66백만원 (A=972㎡)

□ 금후 추진계획

○ 대성정수장 정수지 점검구 개선공사 추진 : 30백만원 (2개소)

- 자체설계 설계완료	2013. 11. 15

- 공사착공 및 완료	2013. 12. 30

2013 상수도 취 ․ 정수 시설 유지관리

○ 생활․공업용수 생산시설의 효율적인 운영을 위하여 노후 시설물

개량 및 적기 보수로 안정적 상수도 생산 공급을 하기 위함

＊유지관리 방침 : 시특법 의거 정밀점검, 안전진단 및 자체점검 결과를 근거 시행

□ 사업개요

○ 사업대상 : 총 13개소(취수장 2, 정수장 2, 배수지 9)

- 생활용수(2종시설) : 대성정수장, 방수리취수장, 배수지 9개소

- 공업용수(1종시설) : 팔복정수장, 전미취수장

- 송 ․ 도수 관로 : 57㎞  (송수관 26 , 도수관 31 )

- 기계․전기설비 : 취․정수시설, 폐수처리시설, 수전설비 등

○ 사 업 비 : 1,359백만원

□ 추진상황

○ 시설물 유지관리 (491백만원/44건)

- 상수도시설물 정밀점검용역	1건 / 13백만원

- 대성정수장 정수지 내부개량 공사	1건 / 220백만원

- 전미취수장 취수관로 교체(L=60m,D800⇒1200)	1건 / 43백만원

- 상수도시설물 청소 및 기타 소규모공사	41건 / 215백만원

□ 금후 추진계획

○ 취․정수, 배수지 시설 및 송․도수관로 정기적 점검, 적정보수

○ 공업용수 생산시설 개량을 통한 용수수요 증가 대비

- 공업용수 도수관로 확장교체 착공 (’13. 11월중)

- 전미취수장 취수관로 잔여 교체구간(L=64m) 보수

-  취․정수 설비 적정 유지관리를 통한 안정적□기업 용수공급

하 수 과  소 관

□ 효율적인 지하수 관리로 하수도 세입증대	----	23
□ 물 재이용 관리계획 수립 용역 추진	----	24
□ 하수처리 편입구역 하수관거 정비	----	25
□ 중앙처리구역 하수관거 정비	----	26
□ 효자처리구역 하수관거 정비	----	27
□ 중앙처리구역(3, 10분구) 하수관거 정비	----	28
□ 합류식 하수도(CSOs) 및 초기우수 처리시설	----	29
□ 전주하수처리장 총인처리시설 설치	----	30
□ 하수슬러지 처리시설 설치	----	31
매암지구 마을하수도 정비	----	32
진기지구 마을하수도 정비	----	33
하수처리장 운영(민간위탁) 관리	----	34

효율적인 지하수 관리로 하수도 세입증대

○ 지하수 유량계를 고장 방치하거나 이용허가 없이 사용하는

수용가에 대하여 공인유량계 설치 등 철저한 관리로 세입증대 기여

□ 현    황

(단위 : 건)

구 분	계	가정용	일반용	대중탕용	산업용
총 계	930	132	687	73	38

□ 추진상황

○ 검침곤란 지하수 사용가 시설 실태조사	’13. 2월 ~ 3월

- 유  형 : 땅 속 깊은 곳, 도로변, 위험지역, 화단맨홀 등

○ 지하수 사용료 고액 체납자 징수	’13. 4월

- 대  상 : 100만원이상 고액 체납자(51개소)

○ 지하수 옥외 원격검침기 설치대상지 선정 완료	’13. 4월

- 사업량 : 200개소(검침곤란, 다량수용가)

- 사업비 : 40백만원(‘13년 본예산 확보)

○ 전문인력 확보 등 체계적 관리방안 수립을 위한 TF팀 구성 운영	’13. 8월

○ 검침이 어려운 지하수 유량계 원격검침기 설치(200개)	’13. 8월

전년 동기 대비(8월 ∼ 10월) 지하수 사용료 세입 증가 : 189백만원 (12% ↑)

□ 금후계획

○ 고장난 지하수 유량계․계측기 연차적 교체로 지하수 시설물 관리 강화	지속

○ 시민의 안전한 건강을 위해 수질검사 안내 (SMS 통보 등)강화	수시

○ 체계적인 관리를 위한 지하수 관리 조례 제정	’14년 상반기

물 재이용 관리계획 수립 용역 추진

○ 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 시행(’11.6.9)에 따른 법정

계획으로 ’13년 상반기 중 물 재이용 관리계획 수립(환경부 방침)

○ 물 재이용 활성화 및 지속 가능한 친환경 수자원 확보

□ 사업개요

○ 용역기간 : ’13. 4월 ~ ’14. 7월

○ 사업규모 : 총 8.5억원

○ 계획구역 : 전주시 일원 및 완주군 인접(이서,구이,상관면)포함

□ 추진상황

○ 물 재이용 관리계획 추진방안 수립	’12. 10월

○ 물 재이용 관리계획 수립용역 발주(총괄)	’13.  3월

- 예산 미확보로 우선 3억원 용역 시행

○ 물 재이용 관리계획 수립용역 업체선정 및 계약	’13.  5월

○ 물 재이용 관리계획 T/F팀 및 포럼개최	’13.  6월

○ 용역비 부족액 추경(1차) 예산 확보 완료 : 5.5억원(일반회계)

○ 물 재이용 관리계획 수립용역 기초자료 수집	’13. 6월 ~ 8월

○ 물 재이용 조사대상 현장조사 실시	’13. 8월~

□ 금후계획

○ 물 재이용 관리계획 수립 용역 1차 중간 보고회 개최	’14. 2월

○ 물 재이용 관리계획 수립 용역 2차 중간 보고회 개최	’14. 4월

○ 물 재이용 관리계획 수립 용역 최종 보고회 개최	’14. 6월

○ 물 재이용 촉진 및 지원 조례 제정	’14. 9월

하수처리 편입구역 하수관로 정비

○ 전주천․삼천 상류지역의 생활하수를 차집 하수처리장에 유입

○ 공공수역 수질오염 방지로 쾌적한 하천 수변 공간제공

○ 농촌동 마을하수도 개량으로 시민 보건위생 증진

□ 사업개요

○ 사업기간 : ’08년 ~ ’14. 6월

○ 위    치 : 평화동 장교마을 등 48개 마을

○ 사업규모 : 관로정비 L=75.8㎞, 배수설비 2,254개소

○ 사 업 비

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	기금
총사업비	403	198	14	164	27
기 투 자	302	143	3	135	21
13 년 도	96	55	11	24	6
14 이후	5			5

□ 추진상황(공정 90%)

○ 지방재정 투융자심사완료(행정자치부)	’07. 10월

○ 실시설계용역 및 행정절차 이행	’07. 6월 ~  ’08. 8월

○ 공사계약, 5개 지구 공사 착공	’08. 10월

○ 중인지구, 평화지구 준공	’13.  5월

□ 금후계획

○ 중복,전주천지구, 박물관지구 준공	’13.  12월

○ 월드컵경기장지구 잔여 사업추진	’14. 6월 완료

- 하수관로 L=8.7㎞, 배수설비 416개소

중앙처리구역 하수관로 정비

○ 노송천 자연형 하천 복원사업 상류 오염원 차단으로 시민에게

생명력 있는 수변공간 제공

○ 지하수, 우수 등 불명수 감소로 하수처리비 절감

□ 사업개요

○ 사업기간 : ’10. 1월 ～ ’14. 6월

○ 위    치 : 완산구 중앙, 풍남, 중앙동일원(노송천복원사업 상류지역)

○ 사업규모 : 관로정비 L=26.3㎞, 배수설비 3,041개소

○ 사 업 비

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	기금
총사업비	299	149	19	113	18
기 투 자	176	75	4	88	9
13 년 도	122	74	15	24	9
14 이후	1			1

□ 추진상황(공정 80%)

○ 공사계약, 착공 및 1~6차분 준공	’10. 1월 ～ ’12. 12월

○ 7차분 사업추진	’13. 2월 ～ ’14.  6월

□ 금후계획

○ 군경묘지 진입로 등 잔여구간 사업추진	’14. 6월 완료

- 하수관로 L=4.0㎞, 배수설비 938개소

효자처리구역 하수관거 정비

○ 새만금 상류지역 목표수질 조기달성과 하천 수질개선 시급

○ 하수관거 우․오수 분리와 건물 정화조 폐쇄로 시민보건 위생 향상

○ 지하수, 우수 등 불명수 감소로 하수처리비 절감

□ 사업개요

○ 사업기간 : ’13년 ~ ’15. 6월

○ 위    치 : 효자처리구역(효자동 일원), 하수처리장 주변마을 등

○ 사업규모 : 관거정비 L=34.4㎞, 배수설비 1,552가구

○ 사 업 비

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	기금
총사업비	200	100	19	66	15
기 투 자	32	13	2	15	2
13 년 도	62	33	5	20	4
14년 이후	106	54	12	31	9

□ 추진상황(공정 30%)

○ 행정절차이행(공공하수도 설치인가, 계약심의) 완료	’12. 11월

○ 공사계약 및 착공	’13.  1월

- 동물원, 삼천동 황소마을, 송천동 회룡․월평마을

□ 금후계획

○ 잔여구간 사업추진	’15. 6월 완료

- 하수관거 L=20.5㎞, 배수설비 1,409개소

중앙처리구역(3, 10분구) 하수관로 정비

○ 새만금 상류지역 목표수질 조기달성과 하천 수질개선 시급

○ 하수관거 우․오수 분리와 건물 정화조 폐쇄로 시민보건 위생 향상

○ 지하수, 우수 등 불명수 감소로 하수처리비 절감

□ 사업개요

○ 사업기간 : ’13년 ~ ’16년

○ 위    치

- 건산천 우안지역(시외버스터미널, 사대부고사거리부근)

- 노송천 우안지역(테스트베드지역)

○ 사업규모 : 관로정비 L=55.3㎞, 배수설비 1,640개소

○ 총사업비 : 397억원(국비 199억, 도비 40억, 시 135억, 기금 23억)

- ’13년예산 : 17억원(국비 5억, 도비 1억, 시 10억, 기금 1억)

□ 추진상황

○ 지방재정 투융자 심사 완료(중앙)	’13. 03월

○ 계약심의	’13. 04월

○ 원가심사(도), 일상감사(시) 완료	’13. 10월

○ 실시설계용역 발주	’13. 11월

◼ 사업수행능력평가(PQ)기준 변경에 따른 실시설계용역 발주 지연

◼ 총사업비 470억 요구 새만금지방환경청 협의결과 397억 승인(’13. 1월)

⇒ 실시설계용역 결과에 따른 재원협의시 총사업비 확정

□ 금후계획

○ 실시설계 용역 추진	’13. 12월 ~ ’14. 06월

○ 공사 시행	’14. 07월 ~ ’16. 12월

합류식 하수도(CSOs) 및 초기우수 처리시설

○ 새만금유역 수계에서 발생하는 합류식 하수도 월류수(CSOs)      및 초기우수를 적정 저류․연계 처리하여 새만금유역 목표      수질의 조기달성

□ 사업개요

○ 사업기간 : ’09년 ~ ’14년(6개년)

○ 위    치 : 전주시 환경사업소내(덕진구 송천동2가 1035번지)

○ 사업규모 : 저류조 1개소(10만㎥), 우수토실 개량 19개소

○ 사 업 비

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	기금
총사업비	480	240	48	168	24
기 투 자	183	110	22	38	13
13 년 도	110	52	10	42	6
14년도(완료)	187	78	16	88	5

○ 사업 추진방법 : 민간대행사업 추진(한국환경공단)

□ 추진상황(공정 70%)

○ 1, 2차분 공사계약 완료	’10. 12월 ~ ’12. 8월

○ 총사업비 및 기간 변경 승인	’12. 7월

※ 총사업비(48,000 → 48,063백만원), 기간(준공기한 ’13년 → ’14년)

○ 3차분 공사 추진	’12. 8월 ~ ’13. 6월

○ 4차분 및 잔여 공사 추진	’13. 7월 ~ ’14. 6월

□ 금후계획

○ 종합 시운전(6개월) 및 준공	’14. 7월 ~ ’14. 12월

전주하수처리장 총인처리시설 설치

○ 하수도법 개정( ̕10. 2. 26)으로 새만금 상류지역 하수처리장     방류수 수질기준 강화( ̕12. 1. 1부터 시행)에 따라 총인(T-P)     처리시설 추진 필요

□ 사업개요

○ 사업기간 : ‘10년 ~ ‘14년

○ 위    치 : 전주시 환경사업소내(덕진구 송천동2가 1035번지)

○ 규    모 : 403천㎥/일, 총인(T-P) 2.0 ⇨ 0.2mg/L이하

○ 사 업 비

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	기금
총사업비	313	157	63	78	15
기 투 자	32	6	3	22	1
13 년 도	111	45	23	37	6
14년도(완료)	170	106	37	19	8

□ 추진상황

○ 실시설계 적격자 선정(조달청 → 금호산업)	’13.  6월

○ 실시설계 심의 완료(도 지방건설기술심의회)	’13. 9월

○ 전면책임감리용역 착공	’13. 10. 28

○ 총인처리시설공사 착공	’13. 10. 28

□ 금후계획

○ 공사 추진 및 준공(시운전 포함 14개월)	’13. 11월 ~ ’14. 12월

하수슬러지 처리시설 설치

○ ’12년부터 해양투기 금지에 따른 하수슬러지(찌꺼기) 처리시설 설치

○ 하수찌꺼기의 안정적 처리로 자연환경 보전에 기여

□ 사업개요

○ 사업기간 : ’10년 ~ ’15년(6개년)

○ 위    치 : 완산구 삼천동3가 749번지, 전주시 환경사업소

○ 규    모 : 감량화(250톤 ⇨ 150톤/일), 건조 소각(150톤 ⇨ 65톤/일)

○ 총사업비

(단위 : 억원)

구 분	계	국 비	시 비	(민투)
총사업비	379	185	9	185
기 투 자	20	11	9
13 년 도	94	44	-	50
14 년도 이후	265	130	-	135

□ 추진상황

○ 공모방식에 의한 입지선정(안산, 삼삼마을 인근)	’08.  9월

○ 민간투자 정부고시 사업으로 추진결정	’09.  8월

○ 시설사업기본계획 고시	’12.  1월

○ 제안서 평가 및 우선협상대상자 선정(주․태영)	’12.  4월

○ 실시협약(안) 민투 심의(소위원회 완료)	’13. 10. 24

○ 실시협약(안) 민투 심의(본심의)	’13. 11. 08(예정)

□ 금후계획

○ 사업시행자 지정 및 실시협약 체결	’13. 11월

○ 실시설계 및 폐기물 설치계획 승인(도)	’13. 11월~ ‘14. 02월

- 실시설계 경제성 검토(VE) 및 설계심의, 실시계획 인가 등 절차이행

○ 공사 착공 및 준공	’14. 2월 ~ ‘16. 2월

※ 전주시 종합리싸이클링타운 조성사업 일정에 맞추어 추진

매암지구 마을하수도 정비

○ 농촌마을 하수도 시설개량 및 우․오수 분리로 하수처리 효율 극대화

○ 주민의 삶의 질 향상 및 새만금 상류지역의 하천수질 개선

□ 사업개요

○ 사업기간 : ’09년 ~ ’13년

○ 위    치 : 덕진구 성덕동 일원(매암 외 4개마을)

○ 사업규모 : 하수처리시설 Q=190㎥/일, 하수관거 L=8.7㎞

○ 사 업 비

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	시비	기금
총사업비	50	29	19.3	1.7
기 투 자	32	19	11.8	1.2
‘13년(완료)	18	10	7.5	0.5

□ 추진상황(공정 90%)

○ 하수도정비기본계획변경 승인(환경부)	’07.  7월

○ 실시 설계용역 완료	’09.  9월

○ 공공하수도 인가신청 및 재원 협의	’09.  9월

○ 지방재정투융자심사(전라북도) 완료	’09. 11월

○ 인가 및 공사발주(조달청)	’09. 11월

○ 1차 ~ 6차 공사추진 완료	’09. 12 ~ ’13.  6월

○ 7차분 추진	’13. 03 ~ ’13. 12월

□ 추진계획

○ 공사완료	’13. 12월

진기지구 마을하수도 정비

○ 농촌마을 하수도 시설개량 및 우․오수 분리로 하수처리 효율 극대화

○ 주민의 삶의 질 향상 및 새만금 상류지역의 하천수질 개선

□ 사업개요

○ 사업기간 : ’10년 ~ ’14년(4개년)

○ 위    치 : 덕진구 전미동 일원(진기외 3개마을)

○ 사업규모 : 펌프시설 1개소, 하수관거 L=6.7㎞

○ 사 업 비

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	시비	기금
총사업비	25	17	7	1
기 투 자	6	3.5	2.1	0.4
13 년 도	15	10.5	4.2	0.3
14년도(완료)	4	3	0.7	0.3

□ 추진상황(공정 30%)

○ 진기마을 주민 마을하수처리장 설치 반대로 사업유보	’09. 11월

○ 사업내용변경 승인(지방환경청)	’12.  8월

※ 하수처리장을 펌프시설로 변경하여 효자처리구역으로 연계 처리

○ 실시설계 완료	’12. 10월

○ 1차분 추진	’13. 5월 ~ ’14. 3월

□ 금후계획

○ 잔여분 공사추진 및 준공	’14. 11월

하수처리장 민간위탁 관리 운영

○ 민간기업의 전문기술 도입으로 운영비용 절감 및 효율적인       운영을 위해 하수처리장 3단계 사업을 완료하고 민간위탁 운영      하여 하천 수질 개선 도모

□ 사업개요

○ 규    모 : 하수처리장 403천톤/일, 위생 290㎘/일

○ 기    간 : ’04. 12월 ~ ’24. 11월(20년간)

○ 위탁업체 : 전주개발(주)

○ 운 영 비 : 202억원/년

(하수처리 105억, 위생처리 3억, 대수선 27억, 슬러지 67억)

○ 운영수질

(단위 : mg/ ℓ)

항목 구분	BOD (5이하)	COD (20이하)	SS (10이하)	T-N (20이하)	T-P (0.2이하)	대장균 (1000이하)
1․2단계	3.7	17.4	4.6	9.0	0.7	30
3단계	3.5	8.2	3.8	7.5	0.6	189

○ 처 리 량 : 1일 평균 375천톤(’12년 기준)

□ 추진상황

○ 반송 및 잉여슬러지 인발유량계 교체공사 등 8건 착공	’13. 2월 ~ ’13. 6월

○ 하수처리장 안전사고 대비 합동점검 실시	’13. 6월

○ 하수처리장 생슬러지 준설 및 게이트밸브교체공사 등 2건 완료	’13. 6월

○ 하수처리장 기술진단 완료(한국환경관리공단)	’13. 6월

○ 하수처리장 에너지진단 추진	’13. 8월 ~ ’13. 10월

□ 금후계획

○ 하수처리장 대수선사업추진(협잡물콘베어 교체 등 15건)	’13. 7월 ~ ’13. 12월