제312회 전주시의회 임시회

도  시  건  설  위  원  회

2014년도

주요업무 추진상황 보고

덕 진 구 청

보  고  순  서

□	일 반 현 황		-------	1
□	2014년 구 정 운 영 방 향		-------	3
□	주요업무 추진상황		-------	4
	○	민 원 봉 사 실	-------	5
	○	경 제 교 통 과	-------	14
	○	건 축 과	-------	22
	○	건 설 과	-------	33

Ⅰ. 일  반  현  황

		연 혁
❍ 1988. 7. 1. 출장소 개소 ❍ 1989. 5. 1. 구청 개청

□ 인    구 : 285,950명 (市의 43.9%)

❍ 총 110,032세대(평균 가족수 2.6명)

❍ 연령분포 : 19세 이하(23.2%), 20~64세(65.5%), 65세 이상(11.3%)

□ 도시계획 면적 : 110.57㎢ (市의 53.6%)

❍ 주거지역 : 16.58㎢        ❍ 상업지역 :  2.45㎢

❍ 공업지역 :  5.93㎢        ❍ 녹지지역 : 77.23㎢

❍ 기타(관리․농림지역) : 8.38㎢

□ 행정구역 : 15동 / 555통 2,875반

□ 도시기반

❍ 주  택 보급률 : 109.3%   ❍ 도시가스 보급률 : 93.1%

❍ 상수도 보급률 : 99.6%    ❍ 하수도 보급률 : 96.9%

❍ 도  로 : 355㎞(국도 50 지방도 6 시도 299)  ※ 고속도로 5.2㎞

□ 재정규모

		세입 : 126,744백만원						세출 : 76,538백만원
￭ ￭ ￭ ￭	지방세 세외수입 국고보조금 시도비보조금		111,410(87.90%) 4,579( 3.61%) 6,798( 5.36%) 3,957( 3.12%)			￭ ￭ ￭ ￭ ￭	일반행정ㆍ공공질서 환경ㆍ사회ㆍ보건 문화관광ㆍ농림 수송교통ㆍ국토개발 인건비ㆍ기본경비		6,964( 9.10%) 21,256(27.77%) 783( 1.02%) 13,872(18.12%) 33,663(43.98%)

□ 기    구 : 8과 47담당 15동

												구 청 장
	행정지원과					민원봉사실					생활복지과				세무과					경제교통과				환경위생과				건축과					건설과
	6담당					5담당					7담당				6담당					6담당				5담당				6담당					6담당
																15동

□ 정‧현원

(2014. 6. 30. 기준, 단위 : 명)

구 분	합계	구	동	비 고
정 원	442	271	171
현 원	426	258	168
증 감	△16	△13	△3

※ 청경 4명, 무기계약근로자 140명(환경미화원 78, 공무직 62),

별도정원 9명(휴직 6, 교육 3)

Ⅱ. 2014년 구 정 운 영 방 향

대한민국 창조경제의 중심, 덕진구

	◀ 구정 운영 4대 기본방향 ▶
현장 중심 시민우선의 현장행정 참여하고 소통하는 열린행정 남녀노소 전 생애 나눔복지 쾌적한 환경, 푸른 자연의 녹색도시

	◀ 4대 역점 추진 전략 ▶
□ 현장행정 내실운영으로 현장중심, 시민우선의 현장행정 체질화 □ 양방향 소통 강화로 시민이 공감하고 참여하는 열린 행정 구현 □ 시민에게 감동을 주는 생활 복지 및 민원 서비스 □ 편리한 도시기반 확충 및 자연친화적 녹색건강도시 조성

Ⅲ. 주요업무 추진상황

□	민원봉사실	-------	5
□	경제교통과	-------	14
□	건축과	-------	22
□	건 설 과	-------	33

민원봉사실 소관

□	기 본 현 황		----	6
□	주요업무 추진상황		----	9
	□	공정하고 적정한 개별공시지가 산정	----	10
	□	공유토지분할 특례법 운영	----	11
	□	도로명주소 완전 정착 홍보	----	12
	□	디지털 지적구축을 위한 지적재조사사업	----	13

기  본  현  황

□ 기    구

					민 원 봉 사 실
민원행정팀			가족관계등록팀				토지정보팀			지적민원팀				지적기술팀
주민등록․인감 관 리			가족관계등록 신 고 처 리				개별공시지가 조사 ․ 산정			토 지 이 동 정 리				지 적 측 량 검 사
유 기 민 원 접 수			가족관계등록부 정 정				부 동 산 실거래가 신고			지적도면 전산 시스템 운영				도로명주소 (새주소)사업
제증명 발급 및 외국인 업무			수형인명부 관리 및 신원조회				부 동 산 중개업소 관리			조상땅 찾기 정 보 제 공				지적재조사 사 업
무인민원발급창구 관리			가족관계증명서 발 급				개발부담금 부과․징수			기타단체 및 비법인 등록․변경				지적기준점 관 리
5명			5명				5명			4명				5명

□ 정․현원

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	25	1	7	11	3	3
현 원	24	1	10	8	3	2
증 감	△1	0	3	△3	0	△1

※ 무기계약근로자(공무직) 2명 미포함

□ 개별공시지가

(단위 : 필지)

조 사 대 상			비 고
계	사 유 지	국․공유지
71,974	65,199	6,775	표준지 수 : 1,651 7.1일 기준 : 1,627

□ 부동산 중개업소

(단위 : 개소)

계	법 인	중 개 사	중 개 인	비 고
498	4	468	26

□ 지적공부 관리

(단위 : 매)

지적도	임야도	수 치 지적도	토지(임야)대장			마이크로필름
			전산파일	카드대장	부책대장
1,142	52	317	100,735	109,813	274권	258,944

□ 지적측량 기준점

(단위 : 점)

계	지적삼각점	지적삼각보조점	도 근 점	비 고
4,830	14	164	4,652

□ 도로명주소 시설물

(단위 : 개)

계	건 물 번호판	도 로 명 판			지 역 안내판	비 고
		소 계	차량용	보행자용
37,765	35,492	2,253	1,152	1,101	20

□ 토 지 등 록

지 목 별

(단위 : ㎢)

구 분	계	전	답	대	임 야	공 장	기 타
필 지	100,735	15,219	18,452	33,445	5,080	592	27,947
면 적	110.92	11.26 (10.2%)	28.91 (26.1%)	13.67 (12.3%)	24.74 (22.3%)	2.90 (2.6%)	29.44 (26.5%)

등록지별

(단위 : ㎢)

합 계		토지등록지		임야등록지		수치등록지
지번수	면 적	지번수	면 적	지번수	면 적	지번수	면 적
100,735	110.92	86,086	76.28 (68.8%)	3,963	23.38 (21.1%)	10,686	11.26 (10.1%)

소유자별

(단위 : ㎢)

구 분	합 계	민유지	국유지	도유지	시유지	기 타
필 지	100,735	67,515	13,735	499	9,469	9,517
면 적	110.92	63.20 (57.0%)	21.44 (19.3%)	1.58 (1.4%)	8.27 (7.5%)	16.43 (14.8%)

주요업무 추진상황

공정하고 적정한 개별공시지가 산정

○ 5월과 10월 결정․공시된 개별공시지가는 국세․지방세․각종 부담금 등
부과기준으로 활용되어 시민의 재산권 행사와 직결

○ 적정한 개별공시지가 산정 및 인근지가와 균형유지로 객관성 확보

□ 사업개요

○ 조사기준

- 2014. 1. 1일 기준 개별공시지가 ⇒ 2014.  5. 30 결정․공시

- 2014. 7. 1일 기준 개별공시지가 ⇒ 2014. 10. 31 결정․공시

※ 2014년 상반기 토지분할·합병 등 토지이동분 조사·공시

○ 등록필지 : 100,735필지(사유지 77,032, 국·공유지 23,703)

○ 조사대상 : 71,974필지(7. 1일 기준 1,627필지)

○ 주요내용 : 정확한 토지특성 조사와 개별공시지가 산정으로 객관성 확보

□ 추진상황

○ 토지특성 조사	2014. 1.  2 ～ 2. 14

○ 지가산정 및 검증(41,026필지/전체의 57%)	2014. 2. 17 ～ 4. 10

○ 지가열람 및 의견제출(「현장참여제」시행)	2014. 4. 11 ～ 5. 12

- 하향요구 의견제출 10필지 ➡ 하향 조정 1필지, 기각 9필지

○ 심의결과 통지(전주시부동산평가위원회)	2014. 5. 14

○ 개별공시지가 결정․공시	2014. 5. 30

◆ 「감정평가사 전문상담 창구」운영 : ’14. 7. 3 ～ 7. 11

○ 5. 30일 개별공시지가를 결정․공시하고, 7월 11일까지 지가검증 기간 중

민원봉사실 내 임시『감정평가사 전문상담 창구』를 개설 시민의 궁금증 해소

□ 금후계획

○ 5.30일 결정 공시지가 이의신청 접수처리	2014. 7. 30까지

○ 7. 1일 기준 개별토지 특성 조사․산정	2014. 7. 1 ～ 10. 31

공유토지분할 특례법 운영

○ 현 공유토지의 점유상태를 기준으로 간소한 절차에 따라 분할할 수
있도록 함으로써 토지에 대한 재산권 행사와 이용에 따르는 불편을 해소

□ 사업개요

○ 시행기간 : 2012. 5. 23 ～ 2017. 5. 22 (5년간)

○ 대상토지 : 1필지의 토지를 2인 이상이 소유한 공유토지로,
공유자 총수의 3분의 1 이상이 그 지상에 건물을 세워
1년 이상 특정하여 점유하고 있는 등기된 토지

○ 분할신청

- 공유자 총수의 1/5이상 또는 20인 이상의 동의를 얻어 신청

○ 공유토지분할위원회 구성․운영 : 9명

- 위원장 : 전주지방법원 판사 1명

- 위  원 : 전주등기소 등기관 1명 등 8명(당연직 : 동장)

□ 추진상황

○ 공유토지분할위원회 개최	10회

- 개시결정 88필지, 분할 조서의결 70필지

○ 공유토지 분할 정리 완료	31건 / 70필지

○ 소유자 및 이해관계인 공유토지 분할 안내	2,507명

○ 공유토지분할에 관한 특례법 홍보(신문 6회, 천년전주 게재 3회)

○ 공유토지분할 대상토지 소유자 안내문 발송	507필지/1,210명

□ 금후계획

○ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 배제 분할 및 등기

○ 공유토지분할에 관한 특례법 간소화 절차 이용 지속적 홍보

도로명주소 완전 정착 홍보

○ 도로명주소 전면사용(2014.1.1)에 따라 도로명주소의 이용 활성화를
통한 완전 정착을 유도하기 위하여 집중 홍보

○ 도로명주소 시설물의 신속한 정비로 시인성 확보 및 인지도 향상

□ 사업개요

○ 기    간 : 2014. 1 ～ 12월

○ 홍보방법

- 민원봉사실 모든 방문객 대상 도로명주소 스티커 부착·발급

- 시민다중집합장소 주소사용자 교육 및 전세대 안내문 발송 등

- 도로명주소 홍보물(양치컵, 손톱깎이 등) 제작·배포

□ 추진상황

○ 학교․직장 방문 교육, 축제, 행사장 참여	28회 13,000명

○ 건물번호판 등 시설물 정비	110개소

- 정비내용 : 구명판30, 방향오류등17, 번호판63

○ 공동주택 관리비 고지서 도로명주소 전환	219개소

○ 도로명주소 시설물 유지관리 단가계약 체결	2014. 7월

- 신속한 정비 및 민원해결을 위해 조사완료 정비대상 즉시 정비

○ 원룸․다가구주택 등 도로명주소 상세주소 부여	150동 1,298호

□ 금후계획

도로명주소 이용 생활화 홍보	연  중

○ 주민등록증 등 신분증 도로명주소 스티커 발급 및 부착

○ 다중집합장소 등 찾아가는 도로명주소 이용 홍보

○ 도로명주소 홍보 안내문 및 홍보물품 제작 배포

도로명판 등 도로명주소 시설물 신규 설치 및 정비

○ 건물번호판 등 시설물 일제점검 및 정비	2014. 3월 ～  7월

○ 벽면형 도로명판 등 안내시설 확충(특교 50백만원)	2014. 7월 ～ 12월

○ 혁신도시 도로명판 설치(491개)	2014. 7월 ～ 12월

디지털 지적구축을 위한 지적재조사사업

○ 1910년도 제작된 지적도에 기초한 지적행정의 디지털화 추진으로
재산권 분쟁 및 시민불편 최소화를 위한 디지털 지적행정 구축

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2012 ～ 2030년(19년간)

《1단계(2013년도) : 고랑지구》

□ 대상지구 : 고랑동 638-6 일원

□ 대상필지 : 234필지 243,613㎡,  소유자 108명

□ 사업기간 : ’13. 4 ∼ ’14. 7월 / 사업비 : 53백만원(전액국비)

《2단계(2015년도) : 금상지구》

□ 대상지구 : 금상동 152-12 일원

□ 대상필지 : 620필지 523,587㎡,  소유자 219명

□ 사업기간 : ’15. 1 ∼ 12월 / 사업비 : 140백만원(전액국비)

□ 추진상황

○ 고랑지구 지적재조사 실시계획 수립 및 지정	2014.  4월 ～ 10월

○ 고랑지구 지적재조사 측량․조사 사업착수	2014. 12월 ～  2월

○ 고랑지구 지적재조사 경계조정 및 경계확정	2014.  3월 ～  7월

□ 금후계획

《1단계(2013년도) : 고랑지구》

○ 지적재조사 조정금 산정 및 통지	2014.  7월 ～  9월

○ 사업완료 지적공부 정리 및 등기촉탁	2014.  9월 ～ 10월

《2단계(2015년도) : 금상지구》

○ 지적재조사 사업지구 선정 및 지정 추진	2015.  1월 ～  6월

- 실시계획수립(1월) 동의서 징구(1～5월), 지구지정(6월)

○ 지적재조사 측량․조사 사업시행	2015.  7월 ～  9월

○ 경계조정․경계확정, 조정금 산정 등	2015.  9월 ～ 12월

경제교통과 소관

□	기 본 현 황		----	15
□	주요업무 추진상황		----	17
	□	시민이 편안한 가로환경 조성	----	18
	□	아름다운 도시미관 조성을 위한 불법광고물 정비	----	19
	□	자동차관리사업체 관리강화	----	20
	□	시민불편 해소를 위한 불법 주․정차 지도단속 강화	----	21

기   본   현   황

□ 기   구

							경제교통과
경제지원			가로정비				광고물관리					농축산관리					교통관리			교통지도
담배소매인지정 방문·통신전화권유 판매 공장설립․등록 유료직업 소개소 지도 지역공동체사업 추 진			노점상및 노상적치물 지도단속 도로무단 점용과태료 부과․징수				옥외광고물 신 고 ․ 허 가 불법광고물 지도 ․ 단속 옥외광고업 등록 및 지도					근교농업 지원 농․수․축산물 부정유통단속 농업재해 대책 농촌소득 금고지원					자동차관리 사업 지 도․감 독 무단방치 차량처리 무료주차장 설치및관리 이륜자동차 관리 교통유발부담금 부과․징수			주정차단속 및 과태료 부과․징수 사업용자동차 행정처분 교통민원 신고 접수․처리 주요행사 교통소통대책
6명			2명				5명					3명					4명			7명

□ 정․현원

(단위 : 명)

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	33	1	9	10	8	5
현 원	27	1	11	7	8	0
증 감	△6	0	2	△3	0	△5

※ 근무배치 1명, 실무수습 1명, 휴직 3명, 무기계약근로자 20명 (공무직) 미포함

□ 옥외광고물 현황                      (단위 : 개)

계	가로간판	돌출간판		지주간판		옥상간판		세로간판	기타
13,645	6,808		5,247		689		369	67	465

□ 옥외광고 시설물 현황

(단위 : 개소/개)

옥 외 광 고 물 게 시 대			옥외광고업자
계	현수막 게시대	벽 보 판
98 / 114	56 / 72	42 / 42	154업소

□ 자동차 보유

(단위 : 대)

계	승 용 차	승 합	화 물	특 수	비 고
127,690	102,348	5,628	19,345	369

※ 전주시 차량등록 대수 : 262,610 (48.15%)

□ 주 차 장

(단위 : 개소, 면)

계		노상주차장		노외주차장		공한지주차장
개소	면 수	개소	면 수	개소	면 수	개소	면 수
190	9,747	91	4,239	71	5,208	28	300

□ 자동차 관리사업체

(단위 : 개소)

계	자동차 매매업	자동차 폐차업	자동차 정비업				성능점검업
			계	종합․소형	전문정비업	원동기
563	176	10	373	96	277	0	4

□ 교통관련 보유장비

(단위 : 대)

차 량			CCTV무인카메라			장 비
계	승용	승합	계	고정식	주행형	계	스마트폰	무전기
8	6	2	57	52	5	5	5	-

□ 어린이보호구역 방범용CCTV 불법주정차 단속용 전환운영(19대) : ‘12.11.19(1차),‘13.10.14(2차)

주요업무 추진상황

시민이 편안한 가로환경 조성

○ 도로 무단적치 및 불법 노점 행위 계도․단속으로 시민불편 해소와      쾌적한 가로환경 조성

□ 현    황

○ 노점선호구역 : 7개소

- 모래내시장, 아중현대@, 전북대 구정문앞(대학로)

- 송천동 신일@, 회생약국(송천동), 동서로마트(호성동), 호성동 뜨란채@

□ 추진상황

○ 노점상 및 노상적치물 정비	9,182건

- 정비건수 : 노점상 5,474,  노상적치물 3,079, 차량노점 629

○ 상습적 인도점거 행위 행정대집행	3회/ 4톤

○ 불법 노점상 과태료 부과	21건/ 2,588천원

○ 도로상 주차방해시설 수거(나무, 타일, 타이어 등)	6톤

○ 모래내시장 고객선 지키기 캠페인 전개	20회/ 306명

- 주1회/ 상가번영회, 노점연합회, 자생단체회원 등 참여

□ 금후계획

○ 전통시장 상가 및 노점밀집지역 시민 통행로 확보

- 기동순찰반 상시배치 및 민원 빈발지역 순찰근무 강화

○ 다중이용장소, 교통취약지역 노상적치물 상시 순찰 및 정비강화

- 상습 반복적 위반행위에 대하여 강력 단속 및 행정처분

○ 모래내시장 고객선 지키기 캠페인 지속 전개

아름다운 도시미관 조성을 위한 불법광고물 정비

○ 다각적인 불법광고물 단속과 옥외광고물 정비로 아름답고

쾌적한 거리조성 및 살기 좋은 도시환경 만들기

□ 현    황

○ 옥외광고업 등록 업소 : 154업소

○ 광고물 허가 건수 : 13,645개

- 가로 6,808, 돌출 5,247, 지주 689, 옥상 369, 기타 532

○ 단속반 : 2개반 6명(차량 2대)

□ 추진상황

○ 불법 광고물 계도·단속

- 불법광고물 단속 건수	335,045건

- 과태료 부과	75건/ 60백만원

- 명함형전단지 이동통신번호 이용정지	69건

○ 새벽· 야간단속 : 주3회(안골사거리, 전북대, 전주역, 터미널 등)

○ 가위손부대(경제교통과 전직원) 운영	4,245건

- 정비 내용 : 현수막925, 벽보 등 3,320

○ 위생․건축민원 방문시 광고물 설치 사전경유제 운영	315건

○ 찾아가는 옥외광고물 설치유의사항 틈새교육(위생교육 등)	2회/ 950명

□ 금후계획

○ 불법광고 행위자 과태료 부과 등 강력한 행정처분 확행

○ 과 전직원 불법 현수막 정비반(가위손부대)지속 운영

○ 옥외광고물 설치 틈새교육 지속실시(각종 직능단체 교육시)

○ 방학 중 중·고등학생 자원봉사자 불법 광고물정비(7월~8월)

자동차 관리사업체 관리 강화

○ 자동차 관리사업체 지도‧단속 강화로 건전한 자동차 거래 질서 확립

○ 무단방치차량 정비로 쾌적한 도시환경조성

□ 현   황

○ 자동차 관리사업 : 563개소

- 정비업 373, 매매업 176, 해체재활용업 10, 성능점검업 4

□ 추진상황

○ 자동차 관리사업체 지도점검	2회

- 사업정지	1건

- 과징금 부과	31개소/3,700천원

○ 자동차 관리사업 종사자 교육	1회

○ 무단 방치차량 처분	139건

- 견인 54, 폐차처리 45, 범칙금 부과 11, 사법처리 29

□ 금후계획

○ 자동차관리사업체 지도‧점검 강화

○ 자동차관리사업체 종사자 교육

○ 무단방치차량 자진처리 유도 및 위반자에 대한 처분 강화

○ 무단방치차량 내 잔재물품 폐기 전 1년 보관제 시행

시민불편 해소를 위한 불법 주․정차 지도단속 강화

○ 불법 주․정차 지도단속 강화로 시민불편 해소

○ 교통질서 의식 제고를 위한 캠페인 전개로 선진교통문화 정착

□ 현   황

○ 지정 금지구역 : 223개소/150.7km

- 주․정차 금지구역 202개소/120km, 견인구역 21개소/30.7km

○ 단 속 반 : 5개반/14명(직원1, 공무직10, 공익3)

○ 단속장비 : 58대

- 고정식카메라(CCTV)52, 이동식 단속차량5, 수기단속차량1

□ 추진상황

○ 주요대로 및 버스승강장 등 불법 주․정차행위 강력단속

- 단속실적 : 32,493건/1,248백만원

○ 불법 주․정차 특별단속

- 단속유형 : 스쿨존(1,557건), 출·퇴근 시간(4회/45건), 밤샘주차(28회/144건)

○ 야간 및 휴일 민원처리를 위한 상황실 운영(상황반1, 단속반2)

○ 스쿨존 불법 주·정차 금지캠페인 전개 : 6회/730명

□ 금후계획

○ 불법 주․정차행위 근절 및 교통질서 확립을 위한 연중 강력 단속

- 시외·고속버스터미널 및 주요대로변 등 취약지역 상시 단속

- 기타 스쿨존 및 사업용차량 밤샘주차 단속 등 지속 추진

○ 고질 체납과태료 일소를 위해 예금압류 등 강력한 징수 추진

○ 스쿨존 불법 주·정차 금지캠페인 지속 전개

○ 중·고생 불법 주·정차 단속 현장체험(여름방학/80명 정도)

건 축 과 소관

□	기 본 현 황		----	23
□	주요업무 추진상황		----	25
	□	시민 중심의 만족형 건축현장행정 실현	----	26
	□	건축물 부설주차장 관리	----	27
	□	노후 공동주택 관리비용 추진 및 내실화	----	28
	□	나눔과 희망의 집 고쳐주기 사업	----	29
	□	도시주거환경개선으로 삶의 질 향상	----	30
	□	농촌마을환경개선(도시활력)사업	----	31
	□	주거용 특정건축물 양성화 추진	----	32

기  본  현  황

□ 기   구

							건 축 과
건축민원팀			공동주택팀				집수리팀				주거환경개선팀					공원관리팀			녹지관리팀
일반건축물 인․허가			공동주택 관리				집수리종합 계획 수립				도시주거환경 개선사업추진					도시공원 및 자연공원관리			녹지시설물 정비 및 관리
																공원내 불법행위단속			조경가로수 조성
건축물의 유지관리			노후공동주택 관리비용지원				집수리 사업				농촌마을(도시활력증진) 환경개선사업
건축물대장 작성 및 관리			임대아파트 관리				농촌지역주택개량사업				건축행위수반개발행위허가
																공원점용허가			조림육림 사업
가설건축물 관리			임대주택분양 전환 승인								이행강제금 부과징수								산불방지
			건축물부설 주차장관리								개발행위허가협의
7명			4명				2명				8명					3명			5명

□ 정․현원

(단위 : 명)

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	30	1	9	3	15	2
현 원	29	1	7	7	12	2
증 감	△1	0	△2	4	△3	0

※ 육아휴직 1명, 근무배치 1명, 실무수습 1명, 무기계약근로자 10명(공무직) 미포함

□ 건축신고․허가

(단위:건/㎡)

계	주거용	상업용	공업용	기타	비고
414/245,197	158/42,860	217/157,021	19/19,046	20/25,570

□ 건축물대장 관리

(단위:건)

계	일반 건축물	집합 건축물	비 고
108,226	31,058	77,168

□ 주    택

(단위:호)

주 택 수					가구수	주 택 보급률 (%)
계	단독주택	아파트	연립주택	다세대
89,391 (100%)	18,694 (21.42%)	63,683 (70.7%)	2,729 (3.06%)	4,285 (4.82%)	81,783	109.3

□ 건축물 부설 주차장

총 계		기 계 식		자 주 식
개소	대수	개소	대수	계		일 반		공 동
				개소	대수	개소	대수	개소	대수
6,577	109,560	34	740	6,543	108,820	6,308	52,518	235	56,302

주요업무 추진상황

시민 중심의 만족형 건축현장행정 실현

○ 시민의 입장에서 건축 관련 민원을 신속하고 공정하게 처리하여

시민불편을 줄이고 투명한 건축행정 서비스를 제공하며 시공중인

건축현장을 수시 확인하는 등 현장행정을 강화하여 사전 민원해소

□ 개    요

○ 시민 만족 증대를 위한 건축행정 서비스 제공

- 수기서류 접수 시 인터넷(세움터) 대행, 처리기간 단축(1/2) 등

○ 집단민원 중재 등 민원인 만족도 제고를 위한 현장행정 강화

- 건축허가(신고) 공사현장에 대한 일일 현장 점검 실시

○ 친절서비스 및 직무 전문성 강화

- 월 1회 직원 친절교육 실시, 연 2회 전문가 간담회 실시

□ 추진상황

○ 건축민원 처리현황

(2014. 6월말 현재)

구 분	계	허가․신고 (용도변경포함)	사용승인	표시변경	착 공	건 축 물 대장민원
건 수	1,880	414	324	146	310	686

○ 건축관련 생활민원 및 집단민원 처리	35건

- 생활민원 : 28건(건축현장 소음, 조망권, 사생활 침해 등)

- 집단민원 :  7건(차량진출입, 조망권, 장례식장 등)

○ 신속한 민원 해소를 위한 일제 합동점검 실시	37개소

- 허가 표지판 미설치, 현장정리 미흡 등(현지시정)	15건

- 도로자재 무단적치(원상복구 시정명령)	7건

- 안전관리 미 이행(고용노동부 통보)	10건

□ 금후계획

○ 신속한 건축민원 해소를 위한 합동점검반 운영으로 현장행정 강화

○ 집단민원 발생이 예상되는 민원은 주민의견 수렴 등 대안 강구

○ 설계도서(CD) 갖기 홍보를 통한 건축물 유지․관리 효율성 제고

건축물 부설주차장 관리

○ 건축물 부설주차장의 활용도 제고를 통하여 주차난 해소와 위법

행위를 사전 예방하여 건전한 주차문화 정착에 기여

□ 현    황

(2014. 6월말 현재)

총 계		기 계 식		자 주 식
개 소	대 수	개소	대 수	계		일 반		공 동 주 택
				개 소	대 수	개 소	대 수	개 소	대 수
6,577	109,560	34	740	6,543	108,820	6,308	52,518	235	56,302

□ 추진상황

(2014. 6월말 현재)

연도별	점검횟수	적발건수	조치사항	비 고
2012년	14회	70	• 시정완료 70건
2013년	15회	20	• 시정완료 18건 • 시정중 2건
2014년	9회	11건	• 시정완료 3건 • 시정 중 8건

※ 기계식 주차장 정기검사 시정명령 : 2014. 6. 17

–금암동 두산그랜드타운아파트 (272대)

□ 금후계획

○ 자주식 주차장 관리상태 수시 지도 단속

- 민원다발지역 및 위반우려지역을 중심 수시 단속 실시

○ 기계식 주차장 관리상태 점검

- 주차장치 정기안전점검 실시 여부 및 관리상태 점검

- 노후 등으로 이용 저조 기계식 주차장 자진 철거 유도

※ 기계식 주차장 철거 실적 : 8개소, 41대(비용납부 : 46,940천원)

노후 공동주택 관리비용 추진 및 내실화

○ 노후 공동주택의 공용부분 및 부대시설을 개선할 수 있도록 관리

비용을 일부 지원하여 입주민의 쾌적하고 안정된 주거환경 개선

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014. 1월 ～ 12월

○ 사 업 비 : 300백만원

○ 지원대상 : 16개 단지(금암동 동남국민아파트 등)

○ 지원금액 : 최고 20백만원 / 사업비의 70%이하

○ 사업내용 : 노후 공동주택 공용부분과 부대시설 보수비용 지원

	【전주시 주택조례 개정(2013.11.15.)】
∙지원 대상 : 사용검사 후 15년 이상에서 ⇒ 20년 이상으로 변경 ∙지원 금액 : 단지 당 최고 1천만원에서 ⇒ 2천만원으로 상향 ∙신청 기간 : 지원 후 재신청 기간 3년에서 ⇒ 5년으로 변경

□ 추진상황

○ 지원실적(2005년～2013년) : 139개단지(16,572세대), 1,328.5백만원

※ 2013년 지원실적 : 20개단지(3,209세대) / 194.5백만원

○ 사업완료 : 3개 단지 보조금 지급(지급률 17%)

○ 사업진행 : 8개 단지 착공, 5개 단지 입찰공고 중(진행율 60%)

□ 금후계획

○ 전체 사업완료 및 보조금 정산	2014. 11월

○ 지원단지에 대한 만족도 조사	2014. 12월

나눔과 희망의 집 고쳐주기 사업

○ 자활능력이 부족한 저소득 소외계층 가정의 주거환경 개선으로

소득 계층간 양극화 해소 및 삶의 질 향상 기여

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014. 1월 ~ 12월

○ 사 업 비 : 345백만원(도비 50%, 시비 50%)

○ 사업규모 : 115가구(가구당 300만원이내)

○ 사업대상 : 기초생활수급자 및 차상위 등 저소득 계층

○ 사업내용 : 지붕개량, 방수, 도배․장판, 창호, 설비(보일러) 등

□ 추진상황

○ 지원실적(2006년~2013년) : 1,298가구 / 1,630백만원

※ 2013년 지원실적 : 150가구 / 270백만원

지붕개량	도배․장판	화장실․설비보수 등	비 고
22가구	66가구	62가구	※ 만족도 조사 : 매우만족 92%

○ 추진실적(2014. 6월말 현재) : 67가구 완료(진행율 58%)

- 지붕 9, 도배(장판)21, 화장실 8, 부엌 10, 보일러 5, 방수 7, 기타 7

□ 금후계획

○ 전체사업 마무리 및 수혜자 만족도 조사	2014. 12월

- 예산 범위 내 대상가구 추가 지원(수혜가구 총 150가구 예상)

도시주거환경개선으로 삶의 질 향상

○ 도시지역 주거환경이 불량한 지역에 대한 2단계 주거환경정비사업을

마무리하여 주거환경을 개선을 통한 주민 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2006년 〜 2015년(계속사업)

○ 사업대상 : 4개지구(여의∙붓내∙우아․동산 / 총 면적 308,185㎡)

○ 총사업비 : 24,488백만원(국비50%, 시비50%) / ※ 2014년 : 4,425백만원

구 분	2006 ~ 2012	2013	2014
사업비(백만원)	17,901	2,162	4,425

○ 사업내용

- 도로 23개 노선(L=4,372m), 주차장 7개소(A=4,006㎡)

- 소공원 5개소(A=4,746㎡), 공공청사(A=1,879㎡), 복지시설(A=610㎡)

□ 추진상황

○ 공사완료 : 11개 노선(B=6~10m, L=2,208m), 주차장 4개소(1,774㎡)
공원 4개소(2,251㎡), 공공청사 1개소(1,879㎡)

○ 공 사 중 : 12개 노선(B=6~10m, L=2,164m), 주차장 3개소(2,232㎡)
공원 1개소(2,495㎡), 복지시설(610㎡)

	【준공 및 시설물 이관완료】
∙우아지구(2012. 9. 15) ∙여의지구(2013. 3. 5) ∙붓내지구(2013. 6. 11) ※ 동산지구 : 소로개설 7개소, 주차장 1개소, 박스교량 2개소 완료 (공정률 60%)

□ 금후계획

○ 전체사업 완료	2015.  2월

농촌마을환경개선(도시활력)사업

○ 농촌마을의 열악한 기반시설 및 주민편익시설 등 농촌지역

환경을 개선하고 불편사항을 해결함으로써 주민편익 도모

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2005년 ～ 2014년(10개년)

○ 사업대상 : 8개 농촌동 126개마을(※ 2014년 : 5개동 22개 마을)

○ 사 업 비 : 10,024백만원(국비 50%, 시비 50%) / ※ 2014년 : 756백만원

○ 사업내용 : 농촌동 마을안길, 하수도 등 기반시설 개선 및 확충

□ 추진상황

○ 추진실적(2005년~2013년) : 168개 사업 / 92.7억원

※ 2013년 사업실적 : 5개동 16개 사업 (680백만원)

∙우아2동(삼천, 공덕)   ∙동산동(평리, 화개)

∙송천2동(전당)         ∙호성동(봉암, 신봉, 오산, 동산, 고당)

∙조촌동(곡천, 고잔, 원화전, 매암, 덕동, 신기)

○ 사업추진 : 20개 사업 계약의뢰(우아1동 가소마을 등)

○ 사업준비 : 2개 사업

- 농어촌공사 협의(우아1동 장재), 일상감사 의뢰(동산동 평리)

□ 금후계획

○ 공사계약 및 착공	2014.  7월

○ 전체사업 완료	2014. 12월

주거용 특정건축물 양성화 추진

○ 주거용 특정건축물에 대해 한시적으로 특정건축물 정리에 관한

특별 조치법이 시행됨에 따라 시민의 재산권 행사를 위하여 특정

건축물 양성화 추진

□ 사업개요

○ 시행기간 : 2014. 1. 17.~ 2015. 1. 16.

※ 신고기간 : 2014. 1. 17. ～ 2014. 12. 16.(11개월간)

○ 주요내용

- 2012년 12월 31일 당시 사실상 완공된 주거용 특정건축물 양성화

※ 주거용 특정건축물이란? 연면적의 100분의 50이상이 주거용인 건축물

□ 적용대상

○ 세대당 전용면적 85제곱미터 이하인 다세대주택

○ 연면적 165제곱미터 이하인 단독주택(다가구주택 제외)

○ 연면적 330제곱미터 이하인 다가구주택

※ 이행강제금 1회분의 과태료 부과 및 납부, 건축위원회 심의

□ 추진사항

○ 언론보도 등 특정건축물 정리에 관한 특별 조치법 시행 안내

○ 추진실적 : 14건(도시계획 심의 완료) / ※ 사용승인완료 : 5건

□ 금후계획

○ 언론보도 및 동 자생단체 회의자료 등 특정건축물 양성화 지속 홍보

건 설 과 소관

□	기 본 현 황		----	34
□	주요업무 추진상황		----	39
	□	깨끗하고 쾌적한 도로관리 강화	----	40
	□	노후도로 재포장 등 도로정비 추진	----	41
	□	가로망 확충으로 도심 교통난 해소	----	42
	□	도로시설물 안전점검 추진	----	43
	□	가로등․보안등 신설 및 유지관리 체제 구축	----	44
	□	쾌적하고 안전한 생태하천 유지관리	----	45
	□	시민불편지역 정비(참여)사업추진	----	46
	□	재난․재해 사전 완벽 대비	----	47

기   본   현   황

□ 기    구

					건 설 과
도로관리			도로시설						도로조명				하수도관리				하천관리					재난방재
도로 및 시설물 유지 관리			도시계획 사업						가로등 보안등 유지관리				하수도시설물 정비 및 관리				하천시설물 정비 및 관리					재난예방안전 계획 수립,집행
도로 굴착 및 점용 허가			도로개설 사업						가로등 보안등신설				하수도 공기업 운영				골재채취 허가 및 단속					재난상황종합관리체제구축
과적차량 및 불 법 주기 지 도 단 속			도로개설사업에 따른 토지 지장물 보상										공공하수도 사용에 따른 원인자부담금 부과및징수				하천 ․구거 부지 점용 사용 허가 및 사용료 징수					자연재해대책및방재계획수립추진
도로 사용료 부과 및 징수			주민숙원사업 추진										주민숙원사업 추진				폐천부지 관련 업무					민방위 계획 수립 및 추진
설해대책			소 유 권 이전 촉탁														하천개수 및 기성제 정비					민방위대원교육훈련실시
주민숙원사업 추진																	주민숙원사업 추진					민방위장비및물자수급관리

10명		4명		5명		4명		4명		3명

□ 정․현원

(단위 : 명)

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	31	1	9	4	6	11
현 원	30	1	11	9	7	2
증 감	△1	0	2	5	1	△9

※ 근무배치 2명 미포함

□ 도   로

구 분	전주시 (㎞)	덕 진 구		비 율 (%)	비 고
		노선수	연장(㎞)
계	684	984	355	51.9
국 도	64	5	50	78.1	국도노선 1,17,21,26,27호
지 방 도	22	1	6	27.2	지방도 713호
시 도	598	978	299	50.0

※ 고속도로 : 5.2㎞(호남고속도로), 자전거도로 : 48개노선-158㎞

□ 도로 시설물

계	교량	육교	지하보도	지하차도	터널	비고
80개소	68	5	2	4	1

□ 도로보수용 장비 보유

장 비 명	규 격	년 식	수 량	비 고
계			22
도로 보수 장치	8.5ton	2010	1	다목적차량
덤 프 트 럭	8ton	2004⇒1 2006⇒1	2
더 블 캡	1ton	2013	1
굴 삭 기	0.6W	2005	1	브레이커 포함
로 울 러	1ton	1985	1
모 래 살포기		2002⇒1 2004⇒2 2007⇒1 2012⇒1 2013⇒7	12	2013년도확보(7대) 4.5㎥급 : 1대 2.5㎥급 : 1대 0.25㎥급 : 4대 (고지대 동사무소 배치계획) - 11㎥급 : 1대
포 장 절단기		2000	1
함 마 드 릴		2000	1
인도블럭절단기		1999	1
콤 펙 타		2000	1

□ 도시계획 면적

(단위 : ㎢)

구 분	계	덕진구	완산구	비 고
계	313.18
전 주 시	206.28	110.57	95.71	53.6%
김 제 시	11.06
완 주 군	95.84

□ 도시계획 용도지역

(단위 : ㎢)

구 분	계	덕진구	완산구	비 고
계	206.28	110.57	95.71	53.6%
주거지역	35.23	16.58	18.65	47.1%
상업지역	4.50	2.45	2.05	54.4%
공업지역	6.28	5.93	0.35	37.2%
녹지지역	151.62	77.23	74.39	50.9%
기타 (관리,농림,자연환경)	8.65	8.38	0.27	96.9%

□ 도시계획도로 미집행 현황

도로 시설명		구간수(개소)		연 장 (M)		비 고 (미집행률)
등 급	류 별	전 체	미집행	전 체	미집행
합 계		1,348	247	342,527	115,118	33.6％
소 계		113	41	103,993	64,567	54.9％
중 로	1 (20M)	38	20	47,215	35,432	75.0％
	2 (15M)	53	15	43,319	24,771	57.2％
	3 (12M)	22	6	13,459	4,364	32.4％
소 계		1,235	206	238,534	50,551	21.0％
소 로	1 (10M)	159	31	47,914	9,493	19.8％
	2 ( 8M)	445	89	94,846	25,464	26.8％
	3 ( 6M)	631	86	95,774	15,594	16.3％

□ 가로등․보안등 현황

계	가로등	보안등	터 널 및 지하차도등	비 고
19,206	6,509	10,260	2,437

□ 하수도 현황

(2013년말 기준)

구 분	전주시	덕진구	완산구	비 고
총 인구(인)	655,358	289,382	365,976
처리구역내 인구(인)	645,627	280,307	365,320
보 급 률(%)	98.5	96.9	99.8

※ 전주시 하수도 : 계획 1,990km, 시설 1,727km(보급률 86.8%)

□ 하수도 유지관리용 장비

장 비	규 격	수 량	보관장소	비 고
덤프트럭	1톤	1대	자재보관소
더 블 캡	1톤	1대	〃
스타렉스	1톤	1대	덕진구청
콤 펙 타	5HP	1대	자재보관소
캇 타 기	핸드캇타기 14"	1대	〃
함마드릴	1450RPM	1대	"
건식코아드릴	DK-4CD	1대	"
발 전 기	5,000W	1대	"
양 수 기	5.0마력	5대	"
도로캇팅기	20HP	1대	"
CCTV	하수관로조사	1대	〃
수중모터	450ℓ/min	3대	〃

□ 하   천

(단위 : km)

구 분	계	국가하천	지방하천	소하천
개 소	13	3	9	1
연 장(㎞)	47.98	14.75	30.2	3.03
개수율(％)	99	100	98	100

□ 재난예방 특정관리대상 시설물

합계	시 설 물			건 축 물
	소계	도로시설	유원 시설 등	소계	공동 주택	다중이용시설	지방공공시설	대형 광고물	대형 건축물	위험물취 급	기타
839	29	24	5	810	477	273	15	33	7	5

□ 자재 및 물자

자 재 명	수 량	보관장소	비고
수방자재	천막 등 9종 18,676점	덕진구청 지하창고
구호물자	의류 등 3종 310점	진북동 무궁화경로당 콘테이너 창고
방역물자	살충제 등 3종 1,570점	보건소, 맑은물사업소

□ 민방위대 조직

(단위 : 조직/대)

계		지역민방위대		직장민방위대		기술지원대
조 직	인 원	조 직	인 원	조 직	인 원	조 직	인 원
533대	19,175명	497대	18,056명	35대	1,090명	1대	29명

□ 민방위 시설

계	민방공대피소	경보싸이렌	비상급수시설	비 고
175개소	132개소	8개소	35개소

주요업무 추진상황

깨끗하고 쾌적한 도로관리 강화

○ 도로 및 시설물의 지속적인 유지관리로 깨끗한 도로환경 조성

○ 여름철 쿨 서비스 및 완벽한 설해대책으로 쾌적하고 안전한 도로조성

□ 현   황

○ 도로연장 : 관내도로 984개 노선, L=355km

○ 인    원 : 총 12명(도로보수원 9, 운전원 3)

○ 보수장비 : 총 5대(덤프, 다목적차, 굴삭기, 더블캡, 로울러)

○ 제설장비 : 19대[살포기7, 살수차3, 덤프7(자체2,임차5), 굴삭기1, 더블캡1]

※ 초소형 살포기(4대) 동배치(금암2,우아2,인후2,송천1) - 이면도로 제설 탄력적 실시

□ 추진상황

○ 관내 도로 정비 및 보수	연  중

- 도로 소파 6,728개소, 인도 59개소, 자전거도로 36개소 등

- 시설물(볼라드 22개, 경계석 28개 등)

- 지하보․차도 및 터널 소화기함 및 소화기 일제 정비

- 주요 간선도로변 잡초제거

○ 도로 설해대책 추진	2014.1.1.～3.15 /(하반기 11.15～2015.3.15.)

- 주요 간선도로 53개노선 149㎞, 교차로 및 이면도로 80개소

- 시민과 함께하는 도로제설 ⇒ 내점포․내집앞 눈치우기 적극적 시민홍보

○ 건설기계 주기위반 단속	연  중

- 과태료 부과 3건, 계고장 발부 59건

□ 금후계획

○ 폭염대비 도로 쿨 서비스 실시(32°C  2일 이상 지속시)	2014. 7월∼8월

- 폭염대비 다중집합장소 얼음배치 : 전북대구정문 등 12개소

- 관내 주요간선도로 살수 : 기린대로 외 10개 주요 간선도로

○ 도로 및 시설물의 철저한 관리로 깨끗한 도로환경 조성	연  중

노후도로 재포장 등 도로정비 추진

○ 주요 간선도로의 거북균열, 포트홀 등 노후도로 정비 확행

○ 침하 및 훼손된 자전거도로 및 인도정비로 최적의 보행환경 조성

□ 사업개요

○ 정비대상 : 관내도로 984개 노선, L=355km

○ 정비예산 : 1,900백만원

○ 사업내용

- 도로 및 도로시설물유지보수 연간단가 계약	700백만원

- 노후도로 재포장공사	900백만원

- 인도시설․정비 및 자전거도로 정비 등	300백만원

□ 추진사항

○ 도로 및 도로시설물 유지보수 연간단가계약(2월) 보수시행

- 도로포장보수 : 백제대로 등 17개 노선 13,759㎡

- 과속방지턱 설치 및 정비 : 43개

- 펜스 109경간, 표지판 38개소, 볼라드 정비 67개소

○ 노후도로 재포장

- 기린대로 등 4개 노선   : L=7.2km, A=365a

○ 가리내길 등 인도시설․정비 : L=378m, B=1.5m

□ 금후계획

○ 도로 및 도로시설물 유지보수 연간단가계약 지속추진

○ 노후도로 재포장	2014. 10월

- 동부대로 등 2개 노선 :  L=3.9km, A=133a

○ 인도시설․정비	2014. 10월

- 붓내2길 인도설치 L=82m, B=1.5m(설계완료)

- 송천로 인도설치 L=88m, B=1.5m

가로망 확충으로 도심 교통난 해소

○ 장기 미집행 중·소로와 협소 골목도로의 확장·개설 등 교통 악조건       개선을 적극적으로 추진하여 주민 교통 불편 최소화

□ 사업개요

○ 사업규모 : 도로개설 15개 노선/11.3km(기개설 3.7km, 진행중5.6km)

○ 사 업 비 : 71,592백만원 (기투자 25,476, ‘14년 11,838, 이후 34,279)

□ 추진상황

(단위 : 백만원)

공 사 명		사업개요	추진사항	사업비			비 고
				총액	기투자	´14
계(15건)		총 L=11.3㎞, B=4∼20m		71,592	25,476	11,838	이월포함
추천대교~신풍리간		L=1.24㎞, B=20m	개설완료(‘09.12.~‘14. 5.)	18,100	16,600	1,500	준 공
서곡광장~추천대교간		L=1.54㎞, B=20m	L=215m 공사중(‘14.7~‘15. 7.)	19,600	400	1,200	이월+본
산정동 원산정길		L=1.314㎞, B=5→10m	공사중(‘13.09.∼‘14. 9.)	3,400	1,500	1,900	이 월
원동선 도로개설		L=2.64㎞, B=10m	L=1.2km공사중(‘13.12.∼‘14.12.)	5,400	2,762	2,000	이월+본
인후동 견훤왕궁로		L=640m, B=20m	L=200m 공사중(‘14.7~‘15. 4.)	12,500	1,000	2,000	이 월
송천동 솔내로		L=613m, B=10m	L=80m공사중(‘14.07.∼‘14.12.)	4,440	2,840	300
명성강변~사평교간		L=285m, B=12→20m	도시계획선 변경 중(11월)	4,300		760
성덕동 신성길		L=1.62㎞, B=4→8m	도시계획선 결정 중(11월)	1,400		100
인도보행환경개선사업(7건)		L=1,401km		2,452	374	2,078
소로개설	덕진동 호반7길 외 4개소	L=120m, B=4∼8m	완료(‘14. 3.)	231		231	이월
	송천동 솔내2길, 5길	L=286m, B=4→8m	공사중(‘14.3.∼‘14.12.)	730	374	356	이월
	송천동 솔내4길	L=90m, B=12m	공사중(‘14.6.∼‘14.12.)	706		706
	고랑동 쪽구름5길	L=65m, B=4→7m	공사중(‘14.7.~‘14.10.)	85		85	이월
	호성동 초당·동산	L=190m, B=8m	공사중(‘14. 5.∼‘14.10.)	200		200	이월
	호성동 초포다리로	L=200m, B=10→15m	공사중(‘14.7.~‘14.12.)	350		350
	호성동 배미실 진입로	L=450m, B=6m	완 료(‘14.6.)	150		150

□ 금후계획

○ 2014년도분 미보상 용지 매입 및 도로개설 연내 마무리

○ 장기미집행 도시계획도로 우선순위 선정 개설 지속 추진

도로시설물 안전점검 추진

○ 관내 도로시설물의 안전점검을 통해 위해요인을 사전에 파악하여

보수공사의 적기 추진으로 시민들의 안전한 도로 이용환경 제고

□ 도로시설물 현황

구 분	계	시특법 대상 시설물		일반시설물
		1종	2종
계	80	6	15	59
교 량	68	5	11	52
지하보․차도	6	-	4	2
터널 및 육교	6	1	-	5

□ 안전점검의 시기 및 기준

구 분	정기점검	정밀점검	정밀안전진단	비고
점검시기	년2회	2년마다 1회	완공후 10년1회 이후 5년1회
점검방법	자체점검	용역 의뢰

※미점검시 과태료 : 정밀점검 3백만원, 정밀안전진단 100백만원

□ 2014년 안전점검 대상 및 사업비

사업비	점검의 종류			비고
	정기점검	정밀점검	정밀안전진단
70백만원	전체 80개소	5개소 (교량 5)	-	B,C등급

□ 추진상황

○ 정밀점검용역 완료(반월고가교, 추천대교, 소양교)	2014.3월~6월

○ 정밀점검용역 추진(안덕교, 우아교)	2014.6월~9월

○ 관내 도로시설물 상반기 정기점검 완료(80개소)	2014.6월

□ 금후계획

○ 정밀점검용역 및 정기점검 결과에 따른 보수	2014.7월~

○ 관내 도로시설물 하반기 정기점검(80개소)	2014.11월

가로등․보안등 신설 및 유지관리 체제 구축

○ 취약지역에 대하여 가로등․보안등 신설은 물론 기존 시설물의

신속한 보수로 밝은 밤거리 조성 및 시민의 안전과 편익 도모

□ 사업개요

○ 관리등수 : 19,206등

- 가로등 6,509   보안등 10,260   지하차도 터널 2,437

○ 관리인원 : 5명(전기직 3, 운전원 2)

○ 보수장비 : 고가사다리 작업차 2대(대형 1, 소형 1)

○ 사 업 비 : 810백만원

- 시설사업비 650백만원,  재료비 160백만원

□ 추진상황

○ 상반기 가로등․보안등 유지보수 처리	2,060건

- 자체보수 : 1,590건(가로등 590   보안등 1,000)

- 단가계약 :   470건(가로등 120   보안등   350)

○ 가로등․보안등 신설 및 교체(단가)	130등

○ 지하차도 및 터널 조도개선(단가)	1,200등

○ 우기철 가로등 감전사고 대비 보수	204개소

○ 보안등 자동점멸기 설치	330개

□ 금후계획

○ 가로등․보안등 자체보수 지속 추진	연 중

- 자체보수  1,630건(가로등 460   보안등 1,170)

○ 가로등․보안등 유지보수 단가계약 추진	연 중

- 가로등․보안등 보수 : 610등(가로등220  보안등390)

- 가로등․보안등 신설 및 교체 : 170등

- 지하차도 및 터널 조도개선   : 400등

쾌적하고 안전한 생태하천 유지관리

○ 쾌적하고 안전한 생태하천 조성으로 시민들의 건강한 삶의 질

향상과 친수공간 제공으로 도심환경 개선

□ 사업개요

○ 하천현황 : 관내하천 13개소 47.98km (산책로 L=23㎞)

○ 시설현황 : 수문8개소, 운동기구 186개, 체육시설 15개, 편의시설 233개, 생태학습장 1개소

○ 관리인력 : 11명 (공무원 4, 기간제근로자3, 사회복무요원1, 공공근로 3)

○ 총사업비 : 618백만원(본예산 249, 재배정369) ※ 시설비 504백만원

○ 사업내용 : 하천시설물·운동시설 유지관리, 산책로 정비, 하천점용허가 등

□ 추진상황

○ 관내 전주천외 3개 도심하천 순회 정화 추진	2014. 2월～

- 쓰레기 일제 정비 5회/ 70톤 / 연 150명 투입

○ 하천내 불법행위(소각, 경작, 쓰레기투기 등)지도단속 및 홍보	2014. 2월～

- 플래카드 게첨 50개소,  안내판 설치 20개소

○ 하천 시설물 및 운동기구 유지관리사업 단가계약(106백만원)	2014. 2월～

○ 기간제 근로자 채용 하천유지관리(50백만원)	2014. 4월

○ 전주천 국가하천 정비 사업 완료(200백만원)	2014. 6월

○ 전주천 생태학습장 정비완료(20백만원)	2014. 6월

○ 관내 하천 제방도로 및 산책로 제초작업 완료(15백만원)	2014. 6월

○ 아중천 재전마을 앞 석축 및 갈대제거 완료(15백만원)	2014. 7월

□ 금후계획

○ 하천제방 등 하천부속시설물 및 편의시설 유지관리	연 중

- 산책로 보수 20개소, 운동기구․의자 등 편의시설 150개소

- 수문등 하천시설물 정기점검 및 일제정비 : 월 1회 이상

○ 산책로, 제방변 제초작업 및 초화류 유지관리	연 중

- 전주천 외 3개 하천 산책로 및 제방도로 제초 L=48km, 4회/년

- 생태학습장 제초작업 및 초화류 관리(년 3회)

○ 여름철 호우피해 발생시 하천 유지관리	2014.7월～9월

시민불편지역 정비(참여)사업 추진

○ 관내 이면도로 정비(재포장) 및 하수도 정비로 집중호우 시 침수      예방은 물론 쾌적한 주거환경을 조성하여 지역주민의 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 관내 진북동 등 18개소

○ 사업기간 : 2014. 2. ～ 7.

○ 총사업비 : 602백만원(도로분야 535, 재해분야 67)

○ 사업내용 : 진북동 진북파출소 부근 재포장 등 18개소

- 하수도 신설 및 U형 하수도 개량 등	4개소 47백만원

- 견훤로 경사면(토사유출방지)조경사업	1개소 20백만원

- 도로정비 및 안전펜스설치	12개소 515백만원

- 횡단보도 조명등 설치	1개소 20백만원

□ 추진상황

(단위:백만원)

동별	사 업 명	규 모	사업비	추 진 사 항
인후1동	팽나무3길 아스콘재포장	A=17.7a	30	2014. 6월 완공
	이면도로 안전휀스설치공사	L=66m	10	2014. 6월 완공
인후2동	모래내3길 하수관로정비	개량1식	7	2014. 5월 완공
	명주3길외5개소 아스콘재포장	A=15.6a	33	2014. 6월 완공
인후3동	무삼지4길외3개소 아스콘재포장	A=17.7a	35	2014. 5월완공
우아1동	견훤로 경사면(토사유출방지)조경	조경1식	20	2014. 4월 완공
	우아1동 주민센터앞 외 1개소 아스콘재포장	A=37.6a	60	2014. 7월 완공
팔복동	추천5길 아스콘재포장	A=17.7a	37	2014. 6월 완공
송천1동	그린웨이 조성사업	L=170m,B=10m	60	2014. 4월 실시설계추진중
송천2동	용흥마을 하수관 신설	60m	10	2014 6월 완공
조촌동	조촌동 요양병원 하수개량 및 포장	개량1식	15	2014 6월 완공
	원동 옹벽설치 및 배수로정비공사	연장50m	15	2014. 5월 완공

□ 금후계획

○ 진북동 횡단보도 조명등 설치외 4건 : 추경 사업대상지 변경 후 추진(170백만원)

○ 금암2동 거북바위 마실길 조성사업 : 추경 공원조성으로 변경 추진(100백만원)

재난․재해 사전 완벽 대비

○ 재난․재해관리 대상시설물 안전점검 및 사전조치로 대형사고

예방과 재해 발생시 신속한 대처로 시민의 생명과 재산 피해 최소화

□ 현    황

○ 재해위험지구 : 3개소(시 안전총괄과 사업추진 중)

- 진북동 어은골, 팔복동 야전마을, 전미동 진기들

○ 재해우려 및 의심지역 : 8개소

- 절개지 4, 옹벽 2, 소류지 1, 상습침수지역 1개소

○ 특정관리대상시설물 : 839개소(A급 811, B급 11, C급 14, D급 3)

- 교량 23, 공동주택 477, 위락휴게시설 46, 고시원 등 기타 293개 시설

□ 추진상황

○ 상반기 특정관리대상시설 안전점검 실시	3회 실시

- 정기점검 1회, 수시점검 2회(해당시설물 관리부서 협조)

○ 2014 우기대비 재난안전대책 상황실 상시 운영	2014. 5월～10월

○ 재해위험지역 등 관련 시설물 책임담당자 지정 : 17개소 44명

- 수문 8개소 26명(공무원 16, 주민 10명), 언더패스 9개소 18명(공무원)

○ 재해 응급복구 장비 및 수방자재 확보 및 적기 운영

- 장 비 : 155대(백호우 1, 덤프 2, 더블캡 1, 양수기 151대)

- 수방자재 및 물자 : 9종 18,676점(천막, 로프, 톤마대, 모래주머니 등)

○ 우기철 양수기 관리자 지정 운영 : 151대 28명(공무원 15, 주민 13)

○ 상반기 찾아가는 어린이 안전교육 실시 : 106개소 5,456명

□ 금후계획

○ 사전 예찰활동 중심의 재난․재해 발생 사전차단에 역점

- 우기철 대비 재해취약시설 완벽 점검 및 정비 완료

○ 민방위 주민신고망 등을 활용한 주민과 함께 하는 재난재해대책 추진

- 우기 및 태풍대비 주민 행동요령 홍보 강화 등