제312회 전주시의회 임시회

도  시  건  설  위  원  회

2014년도

주요업무 추진상황 보고

완   산   구

보 고 순 서
Ⅰ.	일 반 현 황			---	1
Ⅱ.	2014 구정 운영방향			---	3
Ⅲ.	주요업무 추진상황			---	4
	□	민원봉사실	--------		5
	□	경제교통과	--------		13
	□	건 축 과	--------		21
	□	건 설 과	--------		32

Ⅰ. 일  반  현  황

	연 혁
○ 1988. 7. 1 출장소 개소(5과 12계) ○ 1989. 5. 1 구청 개청(11과 35계) ○ 2006. 8. 8 완산구청 기구조정(9과 47담당) ○ 2008. 6. 30 완산구청 기구조정(8과 44담당) ○ 2012. 7. 18 완산구청 기구조정(8과 45담당) ○ 2013.12. 31 완산구청 기구조정(8과 47담당)

□ 인    구 : 365,635명(전주시 56.1%)

○ 세 대 수 : 139,798세대(평균 가족 수 2.6명)

○ 연령분포 : 18세 이하(22.3%), 19∼64세(66.5%), 65세 이상(11.2%)

□ 도시계획면적 : 95.71㎢(전주시 46.4%)

○ 주거지역 : 18.65㎢  ○ 상업지역 : 2.05㎢  ○ 공업지역 : 0.35㎢

○ 녹지지역 : 74.39㎢  ○ 기    타(관리ㆍ농림ㆍ자연환경) : 0.27㎢

□ 행정구역 : 18개동 / 668통 3,636반

□ 도시기반시설

○ 주  택 보급률 : 122%    ○ 도시가스 보급률 : 93.1%

○ 상수도 보급률 : 99.6%   ○ 하수도 보급률 : 98.6%

○ 도  로 : 336㎞(국도20, 지방도16, 시도300)

□ 재정규모

	세 입 : 152,678백만원					세 출 : 88,092백만원
￭ 지 방 세 ￭ 세 외 수 입 ￭ 국고 보조금 ￭ 시도비 보조금		131,163 (85.9%) 5,495 ( 3.6%) 10,477 ( 6.9%) 5,543 ( 3.6%)			￭ 일반행정･공공질서 ￭ 환경･사회･보건 ￭ 수송･교통･국토개발 ￭ 문화･관광･농림 ￭ 인건비･기본경비		8,843 (10.0%) 28,768 (32.6%) 11,751 (13.4%) 1,047 ( 1.2%) 37,683 (42.8%)

□ 행정조직

❍ 기    구 ― 8과 47담당 18개동

																구 청 장
	행정지원과						민원봉사실								생활복지과					세무과					경제교통과				환경위생과						건축과							건설과
	6담당						5담당								7담당					6담당					6담당				5담당						6담당							6담당
																				18개동

❍ 인    력

(단위 : 명)

구 분		계	일 반	비 고
計	정 원	514	514
	현 원	491	491
	증 감	△23	△23
區	정 원	287	287
	현 원	270	270
	증 감	△17	△17
洞	정 원	227	227
	현 원	221	221
	증 감	△6	△6

※ 청경4명, 무기계약근로자179명(환경미화원106,공무직73), 별도정원9명(구2,동7)

Ⅱ. 2014 구정 운영방향

분야별 중점추진사항

■ 품격있고 쾌적한 도시환경 조성

•쾌적한 주거환경 조성  •질서 있는 활기찬 도시 조성

•안전한 교통문화 정착  •효율적 자원 재활용 활성화

■ 시민에게 감동주는 행복한 맞춤복지 구현

•따뜻한 복지사회 구현      •맞춤형 급여체계 구현

•더불어 행복한 자원봉사 확대  •나눔과 희망의 집 고쳐주기

■ 편리하고 안전한 도시기반시설 확충

•공공시설물의 체계적 관리 •안전한 보행환경 조성

•친환경 생태 공간 확충    •서민밀집위험지역 정비

■ 시민과 함께하는 눈높이 공감행정 추진

•찾아가는 현장행정  •참여와 소통의 열린 행정

•고객만족 감성행정 •열린 주민자치센터 운영

Ⅲ. 주요업무 추진상황

□	민원봉사실 소관		---	5
□	경제교통과 소관		---	13
□	건 축 과 소관		---	21
□	건 설 과 소관		---	32

민원봉사실  소관

□		기 본 현 황	---		6
□		주요업무 추진상황	---		9
	□	찾아가는「개별공시지가 현장설명제」실시		--	10
		공유토지분할 특례법 운영		--	11
		도로명주소 정착을 위한 홍보 및 시설물관리 총력		--	12

기  본  현  황

□ 기    구

													민 원 봉 사 실
	민원행정							가족관계등록							토지정보							지적민원							지적기술
	•주민등록관리 •민원1회 방문 창 구 운 영 •어디서나 민원 창 구 운 영 •외국인 관련 업 무 •통합민원 창구 운 영							•가족관계등록 신고처리 •제적부관리 •수형인명부관리 •가족관계증명서 외 4종 발급 •신 원 조 회							•개별공시지가 조사․산정 •부 동 산 중개업소관리 •부 동 산 실거래가신고 •개발부담금 부과징수							•토지이동지 조사정리 •지 적 정 보 센 터 운 영 •지 적 도 면 전산화시스템 •등 기 촉 탁							•지적측량검사 •등록사항정정 대상토지관리 •지적기준점 관리 •GPS측량 관측자료조사 •도로명주소

□ 정･현 원

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비고
정 원	26	1	7	13	3	2
현 원	28	1	14	5	6	2
증 감	2		7	△8	3

※ 무기계약 근로자 2명(공무직)

□ 개별공시지가

(단위 : 필)

계	사 유 지	국․공유지	비 고
64,588	57,471	7,117

□ 부동산 중개업소

(단위 : 개소)

계	법 인	중 개 사	중 개 인	비 고
693	9	669	15

□ 지적공부 현황

(단위 : 필,장)

지적도	임야도	수치지적도	토지(임야)대장			마이크로필름
			전산파일	카드대장	부책대장
792	83	487	91,832	91,832	248권	305,644

□ 지적측량 기준점

(단위 : 점)

계	지적삼각점	지적삼각보조점	지적도근점	비 고
5,319	8	106	5,205

□ 도로명주소 시설물 현황

(단위 : 개)

계	건 물 번호판	도로명판			지 역 안내판	비 고
		소계	차량용	보행자용
35,595	33,776	1,782	1,020	762	37

□ 토지등록 현황

지 목 별

(단위:필,㎢)

구 분	계	전	답	대	임 야	도 로	기 타
필 지	91,832	9,111	9,555	42,488	5,706	16,291	8,681
면적(㎢)	94.69	5.86	12.24	14.94	43.53	7.62	10.5

등록지별

(단위:필,㎢)

합 계		토지등록지		임야등록지		수치등록지
지번수	면 적	지번수	면 적	지번수	면 적	지번수	면 적
91,832	94.69 (100%)	74,827	41.42 (44%)	4,939	43.20 (46%)	12,066	10.07 (10%)

소유자별

(단위:필,㎢)

구 분	합 계	민유지	국유지	도유지	시유지	기 타
필 지	91,832	58,889	8,426	917	14,845	8,755
면 적	94.69 (100%)	52.00 (55%)	10.09 (11%)	2.29 (2%)	8.48 (9%)	21.83 (23%)

주요업무 추진상황상황

찾아가는「개별공시지가 현장설명제」실시

매년 결정․공시되는 개별공시지가에 대한 현장설명제 운영으로

민원인의 공시지가 이해도를 높이고 현장중심 업무처리로 행정불신 해소

□ 사업개요

○ 추진기간 : 2014. 3월 ~ 12월

○ 대    상 : 의견제출서 및 이의신청서를 제출한 토지소유자, 이해관계인

※ 2013년 기준 : 의견제출 7건, 이의신청 23건

○ 내    용 : 조사현장에 민원인이 참여하여 의견을 진술하고 감정

평가사의 설명 청취

○ 추진방법 : 의견제출서 및 이의신청서 접수 시 현장설명제 참여여부 표기 ⇨ 신청인에 전화 또는 문자서비스로 시간, 장소 통보 ⇨ 담당공무원과 감정평가사 검증 시 현장설명 실시

□ 추진상황

○ 홈페이지 및 각동 자생단체 회의를 통한 홍보 실시

○ 의견제출 및 이의신청시 신청인에 현장설명제 운영 안내

□ 현장설명제 참여 여부 확인 및 참여일 통보

○ 의견제출토지 현장설명회 실시 : 15필지

□ 금후계획

○ 1.1일 기준 이의신청 접수 및 처리	‘14. 7. 1 ~  7.30

○ 7.1일 기준 토지특성 조사	‘14. 7. 1 ~  8. 1

○ 7.1일 기준 지가산정 및 검증	‘14. 8. 5 ~ 10.20

○ 7.1일 기준 지가 결정·공시	‘14.10.30

공유토지분할 특례법 운영

공유토지를 현재의 점유상태를 기준으로 간이한 절차에 따라 분할

할 수 있게 함으로써 토지에 대한 재산권행사와 토지 이용에 따르는

불편을 해소

□ 사업개요

○ 시행기간 : 2012. 5. 23 ～ 2017. 5. 22 (5년간)

○ 대상토지 : 1필지의 토지를 2인 이상이 소유한 공유토지로, 공유자 총수의 3분의 1 이상이 그 지상에 건물을 세워 1년 이상 점유하고 있는 토지

○ 공유토지분할위원회 : 9인

- 위원장 : 전주지방법원 판사 1인

- 위  원 : 전주완산등기소 등기관 1인 외 7인 (당연직:동장)

○ 추진절차

분할신청	□	심사의결	□	측량 및 검사	□	조서의결	□	분할정리 및 등기촉탁
공유자1/5 또는 20인이상 동의		5주이내 의결 3주이상 송달 및 공고		분할측량 및 성과검사		5주이내 의결 2주이상 송달 및 공고		지적공부 및 등기정리

□ 추진상황

○ 공유토지분할 위원회 개최(개시결정 52필, 조서의결 39필)

○ 관련자(소유자 및 이해관계인) 통보 : 2,940명

○ 관내 공유토지분할 신청 대상자 안내문 발송(215건)

○ 공유토지분할에 관한 특례법 홍보(신문 6회, 천년전주 게재 3회)

□ 금후계획

○ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등을 배제하여 분할 및 등기

○ 공유토지분할에 관한 특례법 지속적 홍보

도로명주소 정착을 위한 홍보 및 시설물관리 총력

2014년 도로명주소 전면사용에 따른 혼란 최소화 및 도로명주소

완전 정착을 위하여 홍보 및 시설물 관리에 총력을 기하고자 함

□ 사업개요

○ 기    간 : 연 중

○ 대    상 : 건물 점․소유자를 포함한 모든 시민, 유관기관, 학생 등

○ 내    용 : 안내지도, 생활 밀착형 홍보물 제작을 통한 도로명주소

홍보 강화 및 시설물 체계적 정비

□ 추진상황

○ 도로명주소 일제 고시(법적주소 전환) : 30,341건

○ 도로명주소 완전 정착을 위한 홍보 강화

- 초등학교·민방위교육·직장(우체국 등) 방문교육 실시 : 116회

- 축제시(단오제, 대사습 등) 도로명주소 홍보 부스 운영 : 12회

○ 도로명주소 시설물(도로명판 및 건물번호판) 정비 및 설치

- 도로명주소 시설물 정비 : 1,688건(도로명판 123, 건물번호판 1,565)

- 벽면형 도로명판 설치 :    39건

□ 금후계획

○ 도로명주소 정착을 위한 지속적인 홍보	연  중

- 지역축제시(단오제, 비빔밥 축제 등) 홍보 부스 운영

- 찾아가는 홍보 강화(다중집합장소, 직장 등)

- 상세주소 부여신청 지속적 홍보

○ 도로명주소 시설물 일제조사	2014. 10월경

- 골목길 및 이면도로 등 벽면형 도로명판 설치 (교부세 : 60,000천원)

- 시설물 일제조사 및 체계적 정비로 도로명주소 사용에 시민불편 최소화

경제교통과  소관

�□			기 본 현 황		-----	14
�□		주요업무 추진상황			-----	16
	□			신시가지 조성에 따른 가로환경 정비추진	-----	17
	□			불법 광고물 없는 활기찬 도시만들기 추진	-----	18
	□			『주택가 주차난 완화를 위한』 근린생활권 공한지 무료주차장 확충	-----	19
	□			시민안전 및 교통질서 저해형 주정차 집중단속	-----	20

기  본  현  황

□ 기    구

			경제교통과

경제지원			가로정비			광고물관리			농축산관리				교통관리			교통지도
•지역공동체 일자리사업 추 진 •지역실업자 훈 련 •유료직업 소개업소 •상거래질서 •공장등록 •담배소매업			•가로환경 정 비 •노점상 및 노상적치물 지도단속 •도로무단 점용과태료 부과･징수			•옥외광고물 허가․신고 •옥외광고물 안전도검사 •옥외광고물 도로점용료 부과･징수 •불법광고물 정 비 •불법광고물 과 태 료 부과･징수			•농산 일반 •농수축산물 유통관리 •근교 농업 육 성 •축 산 물 판매업관리				•교통유발 부 담 금 부과․징수 •이륜자동차 관 리 •폐차장관리 •주차장관리 •자동차정비 업체 인허가 •중고매매업소 인․허가 •자 동 차 강제처리			•교통소통 대 책 •불법주･정차 단 속 •불법주･정차 과 태 료 부과․징수 •불법주･정차 CCTV관리 •교통불편 신고접수

□ 인    력

구 분	계	5 급	6 급	7 급	8 급	9 급
정 원	33	1	8	10	9	5
현 원	31	1	13	9	7	1
증 감	△2		5	△1	△2	△4

※ 무기계약 근로자 24명(공무직)

□ 옥외광고물

계	가로간판	세로간판	돌출간판	옥상간판	지주간판	기 타
22,365	10,260	83	9,861	376	1,547	238

※ 옥외광고물 게시대(76개소/78개) 시설관리공단 이관

□ 자동차 보유

계	승 용 차	승 합	화 물	특 수	비 고
139,149	115,346	5,448	18,105	250

※ 전주시 차량등록 대수 : 268,636대(52%)

□ 주 차 장

계		노상주차장		노외주차장		공한지주차장		건 축 물 부설주차장
개소	면 수	개소	면 수	개소	면 수	개소	면 수	개소	면 수
9,829	169,686	233	5,403	238	8,123	20	181	9,338	155,979

□ 자동차 관리사업체

계	자동차매매업	자동차 정비업			자동차폐차업
		종합․소형	부분정비업	원동기
209	9	2	198

□ 교통관련 보유장비

차 량			카 메 라				무전기
계	승 용	승 합	계	디지털	CCTV	PDA
9	7	2	85	12	70	3	12

주요업무 추진상황상황

신시가지 조성에 따른 가로환경 정비추진

유동인구가 밀집되고 있는 신시가지의 신규 노점 및 적치물 등을

지속적으로 계도하고 정비하여 건전한 가로환경 질서를 확립하고자 함.

□ 사업개요

○ 정비기간 : 연 중

○ 정 비 반 : 3개반 12명/차량 3대

○ 정비지역 : 신시가지 도로변, 유동인구 밀집지역, 교통 혼잡지역 등

○ 정비대상 : 불법 노점행위, 인도상 물품적치, 타인주차방해물 등

○ 정비방법 : 자진정비 계도 후 과태료 부과 및 강제 수거

□ 추진상황

○ 가로환경 정비실적(’14. 6월말) : 총 9,350건/신시가지 정비 비중 10% 정도

- 노상적치 4,002건, 노점상 4,275건, 차량노점 1,073건

○ 가게 앞 도로 적치행위 방지 안내문 배부 : 500매

○ 불법 노점 및 노상적치물 집중 단속 실시 : 月 1회

(불법 주정차 및 광고물 합동 단속)

□ 문제점 및 대책

○ 단속 시 즉시 정비가 이루어지나 단속외 시간에 재발로 단속효과 미흡

⇒ 단속시간 수시 변경 및 지속적인 순찰로 예방 단속 강화

○ 노점 및 불법주정차 차량 혼재로 노점차량만 단속 시 교통해소 효과 미흡

⇒ 주요 취약지 교통단속반과 합동 단속 실시

□ 금후계획

○ 지속적인 순회활동으로 신규 노점 방지로 민원 발생 최소화

○ 반복․상습적인 고질 불법노점·적치물 강제철거 및 과태료 부과

불법 광고물 없는 활기찬 도시만들기 추진

불법 광고물 일제 정비를 통하여 쾌적한 도시경관을 조성하고 옥외광고물

질서를 확립하여 시민의식을 고취하고자 함

□ 사업개요

○ 기    간 : 연중

○ 대    상 : 현수막, 벽보, 전단지, 입간판, 배너, 에어풍선 등 불법광고물

※ 관련법규 : 옥외광고물 등 관리법 제3조(광고물등의 허가 또는 신고)

제4조(광고물등의 금지 또는 제한 등), 제10조(위반에 대한 조치)

□ 추진상황

○ 불법 광고물 행정처분 강화로 현수막 등 설치 억제

- 행정처분 : 과태료 50건 77,152천원, 행정계고 120건

○ 불법 광고물 유형별 정비 실적

합 계	현수막	벽보	전단	에어간판	입간판	배너
456,346건	26,693	363,933	64,710	301	407	302

○ 동주민센터 주변 동장 책임정비(벽보, 현수막 등) : 매일 1회 이상

○ 각종 영업허가 시 광고물관리팀 경유 광고물 허가 안내제 운영 : 218건

○ 불법 게릴라 현수막 및 일수명함, 청소년 유해광고물 배포자 집중단속 : 월 2회

□ 문제점 및 대책

○ 무등록 오토바이를 이용한 대출, 일수, 화상채팅등 명함형 전단지 단속지난

➪ 경찰과 협의 하에 주요 배포지역 잠복형태 근무 단속

□ 금후계획

○ 구간별, 지역별, 책임자를 지정하여 매일 불법광고물 정비

- 기동 단속반(2개반 7명) : 현수막, 입간판, 에어간판 등

- 이면도로, 동주민센터 주변 500m이내 각 동 책임정비

○ 불법 현수막, 벽보 부착 등 불법행위자 과태료 부과 강화

『 주택가 주차난 완화를 위한 』

근린생활권 공한지 무료주차장 확충

○ 주택가 공한지를 활용한 무료주차장 설치로 주차공간 확보

○ 주차장내 쓰레기 등 수시정비로 깨끗한 주차공간 제공

□ 사업개요

○ 현    황 :  20개소 181면

○ 사 업 비 :  20백만원

○ 설치방법 :  공한지 내 쇄석포설, 주차라인 등 임시 주차장 설치

○ 인센티브 :  사유지 사용 승낙 시 토지분 재산세 면제

□ 추진상황

○ 공한지 주차장 안전점검 및 환경 정비	: 월 1회

○ 공한지 전수조사 및 재산세 면제 등 홍보	: 2014. 3월

○ 설치 대상지 선정 및 설계, 계약	: 2014. 4월

○ 착공 및 준공	: 2014. 5월 ∼ 10월

- 신규설치 : 1개소 6면 (5월 25일 완공)

□ 문제점 및 대책

○ 주민들의 의식 부족으로 주차장내 쓰레기 및 폐기물 투기

⇨ 주차장을 수시로 정비하여 깨끗하고 안전한 주차 공간 확보

○ 토지 소유주들의 인식 부족으로 토지사용 승낙에 어려움

⇨ 세제혜택(토지세 감면)등 적극적인 홍보 및 설득

□ 금후계획

○ 추가설치 : 1개소(주차문제 심각지역 우선 선정)

○ 보    수 : 3개소 34면 정도(주차라인, 쇄석포설, 카스토퍼 등 보수)

○ 혹서기, 혹한기 안전실태 점검 및 보수 중점 운영 : 분기별 1회

시민안전 및 교통질서 저해형 주정차 집중단속

○ 불법 주정차 단속강화로 원활한 교통소통과 안전한 보행로 확보

○ 사업용차량 밤샘주차 단속 등으로 시민불편사항을 사전 차단

□ 사업개요

○ 단속인력 : 20명(일반직 2명, 공무직 13명, 공익 5명)

○ 단속장비

- 고정식 무인단속시스템 : 78대(교통정체 구간별 탄력적 운영)

- 차량탑재형 이동식 무인단속시스템 : 6대(권역별 근무조 편성운영)

- 수기단속 차량 : 2대(120번 민원, 취약지 기동운영)

※ 관련법률 : 도로교통법 제32조(정차 및 주차의 금지)

□ 추진상황

○ 불법 주정차 단속 : 45,124건 / 1,830백만원 과태료 부과

- 출․퇴근시간 교통정체 해소를 위한 단속반 운영 : 4개반  8명

- 한옥마을, 서부신시가지 등 교통취약지역 강력단속 : 7개반 16명

○ 사업용차량 차고지외 밤샘주차 단속 : 91건/13,650천원

□ 문제점 및 대책

○ 서부신시가지 불법주정차 단속민원 지속적 증가

⇨ 상가밀집지역 계도 및 홍보와 1개반 고정배치 등 강력 단속

○ 아파트 주민 등 단속요구와 주변 상가의 단속완화 요구 상존

⇨ 소통위주 계도 후 불응시 단속 및 주변 상가 주차장 ․ 공영주차장 이용 홍보

□ 금후계획

○ 대형유통시설, 예식장, 한옥마을 등 불법주정차 취약지역 집중단속

○ 스쿨존, 버스베이, 곡각지, 인도, 횡단보도, 홀짝제, 한쪽면 주차지역 등 집중단속        ⇒ 사전예고 없이 즉시단속

○ 사업용차량 차고지외 밤샘주차 등 법규위반 지도단속

건 축 과  소관

�□			기 본 현 황		----	22
�□		주요업무 추진상황			----	24
	□			우리집 건축 설계도서(CD)갖기 운동추진	---	25
	□			건축물 부설주차장 관리	---	26
	□			노후 공동주택 관리비용 지원사업	---	27
	□			나눔과 희망의집 고쳐주기 사업	---	28
	□			농촌마을환경개선(도시활력)사업	---	29
	□			2단계 도시주거환경개선사업	---	30
	□			주거용 특정건축물 양성화 추진	---	31

기  본  현  황

□ 기    구

			건 축 과

건축민원			공동주택			집 수 리			주거환경개선				공원관리			녹지관리
•일반건축물 인･허가 •건 축 물 유지관리 •건축물대장 작성관리 •가설 건축물 관 리 •재해주택관리			•공동주택관리 •지역주택조합 설립인가 •임대주택분양 전환승인 •행위허가신고 •건축물 부설 주차장 관리			•집수리종합 계획수립 •집수리 사업 •농촌마을환경개선(도시활력)사업추진 + •불법건축물 관련지도단속 •이행강제금 부과징수 •폐․공가정비 사 업 추 진			•도시주거환경 개선사업추진 •개발행위허가 협 의 •주민참여사업 추 진				∙도시공원 및 자연공원관리 ∙공원내불법행위 단속 ∙공원점용허가			∙녹지시설 정비 및 관리 ∙녹지대조성 및 가로수 보식 ∙숲가꾸기사업 ∙산 불 방 지 ∙산림병해충 방 제 ∙산 지 전 용 협 의

□ 정･현 원

구 분	계	5 급	6 급	7 급	8 급	9 급
정 원	32	1	9	2	15	5
현 원	32	1	11	6	11	3
증 감	-		2	4	△4	△2

※ 무기계약근로자 10명(공무직)

□ 건축신고․허가

2014.6.30.현재 (단위 : 건/㎡)

계	주거용	상업용	공업용	기타	비고
1,381/594,722	682/194,244	629/351,136	4/633	66/48,709

□ 건축물대장 관리

2014.6.30현재 (단위 : 건)

계	일반건축물	집합건축물	비 고
140,239	36,014	104,225

□ 주    택

2014.6.30현재

주 택 수					가구 수	주 택 보급율 (%)
계	단독주택	아파트	연립주택	다세대
114,570 (100%)	24,245 (21.1%)	87,064 (76.0%)	1,867 (1.7%)	1,394 (1.2%)	138,987	122

□ 건축물 부설주차장(일반, 공동)

총 계		기 계 식		자 주 식
개 소	대 수	개소	대 수	계		일 반		공 동 주 택
				개 소	대 수	개 소	대 수	개 소	대 수
9,909	163,787	66	1,690	9,843	162,097	9,576	80,469	267	81,628

주요업무 추진상황계획

우리집 건축 설계도서(CD)갖기 운동추진

건축물의 유지․관리의 효율성을 증대시키고 시간적․경제적 부담을

해소하여 건축물의 생애를 증가시키고자 함

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014. 1월 ～ 12월

○ 주요내용

- 건축주가 본인 건축물의 설계도서를 CD로 보유하도록 하여 향후
건축행위 및 하자보수 등에 활용

※ 기본설계 도서(배치도, 평면도, 입면도, 단면도), 구조도

설비도서(위생․난방․전기․소방․통신)

○ 추진방법

- 신축건축물에 한해 사용승인시 용역업체로부터 설계 도면이 담긴

CD를 제출하도록 하여 사용승인시 교부

□ 추진상황

○ 업부대행 건축사 행정지도(협회에 안내문 발송) -- ’14.01.07.

○ 건축허가시 조건(안내문) 부여 ------------------- ’14.01.08.

○ 언론보도를 통해 홍보 -------------------------- ‘14.01.22.

○ 건축물 설계도서 CD 교부(160개) ---------- ‘14.2.1~6.30.

□ 금후계획

○ 건축주 향후 건축물 유지관리 등에 활용토록 사용승인시 설계

도서가 담긴 CD 지속 교부

건축물 부설주차장 관리

건축물 부설주차장의 활용도 제고를 통해 주차난 해소와 위법행위를

사전 예방하여 건전한 주차문화 정착에 기여

□ 현    황                                (2014.6월30현재)

총 계		기 계 식		자 주 식
개 소	대 수	개소	대 수	계		일 반		공 동 주 택
				개 소	대 수	개 소	대 수	개 소	대 수
9,909	163,787	66	1,690	9,843	162,097	9,576	80,469	267	81,628

□ 기계식 주차장 철거현황                    (단위 : 천원)

현 황	개 소	대 수	납부 금액	비 고
2011년	5	53	33,062
2012년	5	32	16,843
2013년	8	106	9,245
2014년	1	4	0	자주식 주차장 설치 : 4대

□ 추진상황

○ 자주식 주차장 관리상태 수시 지도 단속

- 민원다발지역 및 위반우려지역을 중심으로 수시 집중단속 실시

○ 기계식 주차장 관리상태 점검

- 점검내용 : 주차장치 정기안전점검 실시여부 및 관리상태

○ 부설주차장 무단용도변경 적발 시 원상복구 시정명령 및 시정조치

- 농소마을 무단용도변경 등 위반사항 26건 적발 12건 시정완료

□ 금후계획

○ 점검반을 구성하여 이행상태 등 수시점검 실시

○ 노후 등으로 이용률이 저조한 기계식 주차장 자진 철거 유도

노후 공동주택 관리비용 지원사업

노후 공동주택의 공용부분 및 부대시설을 개선할 수 있도록 지원

하여 입주자들이 쾌적하고 안정된 주거생활을 영위토록 하기 위함

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014. 1월 ～ 12월

○ 사 업 비 : 300백만원 (단지별 최고 20백만원, 사업비의 70%이내)

○ 완산구 내 공동주택 : 266개단지  86,502세대

○ 지원대상 : 사용검사 후 20년 이상된 공동주택 단지

- 보조금지원 선정단지 : 16개단지 (지원금액 : 300백만원)

○ 사업내용 : 공용부분과 부대시설의 유지․보수 및 안전관리

(옥상방수, 외벽도색, 어린이놀이터 보수, 난방시설 개선 등)

□ 추진상황

○ 사업추진 : 132개단지  1,236백만원 지원 (2005 ～ 2013)

구 분	계	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년
단 지	132	9	14	16	25	12	12	10	11	23
금 액 (백만원)	1,236	86	128	151	245	119	100	97	106	204

○ 지원사업 홍보 및 신청서 접수                 : ’14. 1 ～ 2월

○ 공동주택 지원단지 선정                       : ’14. 3. 27

□ 금후계획

○ 지원단지 보조금 교부결정 통보 및 공사           : ’14. 7 ～ 11월

○ 사업 준공 및 정산                            : ’14. 12월

나눔과 희망의집 고쳐주기 사업

기초생활수급자, 차상위자, 일반저소득가구 등 저소득 계층의 노후   주택을 수리하여 주거안정을 도모하고 소득 계층간 양극화 해소로   민생안정을 도모하고자 함

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014. 1월 ～ 12월

○ 사 업 비 : 345백만원(도비 172.5, 시비172.5)

○ 사업규모 : 115가구(가구당 300만원 한도)

○ 사업대상 : 수급자․차상위자 가구 및 저소득가구

○ 사업내용 : 지붕수리, 도배․장판, 보일러 등 수리

□ 추진상황

○ 집수리 신청 접수                     : 2014. 1월 ～ 2월

○ 현장조사 및 대상자 선정              : 2014. 2월

○ 물품구입 및 기간제근로자 채용        : 2014. 2월

○ 집수리 사업 착수                     : 2014. 3월

○ 사업추진실적 (62가구 / 추진율 54%)

⇨ 사업비 : 345백만원(계획 115가구, 가구당 300만원 한도)

⇨ 추진실적 : 62가구

- 지붕개량 14가구, 도배․장판 36가구, 기타 창호교체 등 12가구

□ 금후계획

○ 사업완료 및 정산                       : 2014. 12월

농촌마을 환경개선(도시활력)사업

관내 농촌마을 기반시설 및 주민편익시설 등 주민숙원 및 불편

사항을 해결함으로써 농촌지역 주민편익 도모

□ 사업개요

○ 사업위치 : 농촌 4개동(동서학동, 평화2동, 삼천3동, 효자4동)    8개마을 10개사업

○ 사업내용 : 마을안길 포장 및 농수로 정비, 하천정비, 쉼터조성 등

- 동서학동(4개마을 6개사업) : 마을안길포장, 농수로정비

소하천용수개거, 휴식의자설치

- 평화 2동(1개마을 1개사업) : 농수로정비

- 삼천 3동(1개마을 1개사업) : 농수로정비

- 효자 4동(2개마을 2개사업) : 농수로정비, 가림막설치

○ 사 업 비 : 502백만원 (국 50%, 시 50%)

○ 사업기간 : 2014. 1월 ~ 12월

□ 추진상황

○ 사업 대상지 조사 및 선정                : 2014. 3월~4월

○ 실시설계 용역                           : 2014. 5월~6월

○ 일상감사 등 행정절차 이행               : 2014. 6월

□ 금후계획

○ 공사발주 및 착공                        : 2014. 7월

○ 사업완료 및 준공                        : 2014.12월

2단계 도시주거환경개선사업

주거환경이 열악한 낙후지역에 도로개설, 주차장 및 소공원 조성 등

주민들에게 실질적으로 필요한 기반시설을 확충함으로써 정주여건

마련 및 삶의 질 향상 도모

□ 사업개요

○ 사업지구 : 12개지구(총 면적 677,601㎡)

□간납대, 종광대, 추심정, 가락, 원각사, 산성, 학봉, 불무, 장승백이,

재실, 흑석골, 바구멀2

○ 총사업비 : 62,047백만원(국비50%, 시비50%)

(단위 : 백만원)

구 분	2006 ～ 2012	2013	2014	비고
사업비	35,367	11,429	15,251

○ 사업기간 : 2006년 ～ 2014년 (계속사업)

○ 사업내용

□도로 64개 노선 L= 9,969m,   □주차장 15개소 A=8,128㎡,

□소공원 16개소 A=11,395㎡

□ 추진상황

○ 공사완료 : 37개노선(B=6～12m, L=5,161m), 주차장 4개소(1,339㎡),

공원 7개소(3,239㎡)

○ 공 사 중 : 18개노선 (B=6～20m, L=3,214m), 주차장 9개소(5,448㎡),

공원 5개소(7,408㎡)

○ 설 계 중 : 도로 9노선(B=6m, L=1,594m), 주차장 2개소(1,341㎡),

공원 4개소(748㎡)

□ 문제점 및 대책

○ 사업지구내 편입토지·건물보상협의 지연으로 사업추진 어려움

⇨ 협의보상 추진 후 미협의시 토지 수용절차 이행

□ 금후계획

○ 2단계주거환경개선사업 완료	: ’14. 12월

주거용 특정건축물 양성화 추진

주거용 특정건축물을 선별하여 한시적으로 사용을 승인함으로써

시민의 재산권을 보호

□ 근    거

○ 특정건축물 정리에 관한 특별조치법(시행‘14.1.17, ‘13.7.16제정)

- 주거용 특정건축물이란 건축물의 연면적의 100분의 50이상이 주거용인 건축물을 말함

○ 신고기간 : 2014.1.17.~2014.12.16.

□ 대    상

○ 2012년 12월 31일 당시 사실상 완공된 주거용 특정건축물

- 세대당 전용면적 85제곱미터 이하인 다세대주택

- 연면적 165제곱미터 이하인 단독주택(다가구주택 제외)

- 연면적 330제곱미터 이하인 다가구주택

□ 추진상황

○ 언론 등에 특정건축물 양성화 추진 홍보 -----------  ‘13.12.

○ 과․동장 회의 및 대상 건축물 관계자에 안내 ------- ‘14.01.

- 대상 42개소(교동, 풍남동이 22개소로 52% 차지)

○ 실적 : 심의신청 24건, 사용승인 13건, 과태료부과액 28,014천원

※ 건축위원회심의를 거쳐 이행강제금 1회분 부과후 사용승인서 교부

□ 금후계획

○ 서민들의 재산권 보호 및 주거생활환경 안정도모를 위해 신고

기간내 대상자 선별 지속 추진

건 설 과  소관

�□			기 본 현 황		----	33
�□		주요업무 추진상황			----	38
	□			깨끗하고 쾌적한 도로관리	---	39
	□			인도 보행환경 개선 사업	---	40
	□			교량 보수․보강 사업	---	42
	□			가로등․보안등 유지관리	---	43
	□			생태하천 정비 및 유지관리	---	44
	□			동완산동 서민밀집위험지역 정비	---	45
	□			『재난․재해 취약지역』집중 관리	---	46
	□			시민불편지역 정비 사업	---	47

기   본   현   황

□ 기    구

			건 설 과

도로관리			도로시설			도로조명			하수도관리				하천관리			재난방재
•도로 및 시설물 유지 관 리 •도로굴착 및 점 용 허 가 •과적차량 및 불법주기 지도단속 •도로 점용료 부과 및 징수 •도로설해대책 •주민숙원사업 추 진			•도시계획사업 •도로개설사업 •도로개설관련 토지지장물보상 •도로부지관련 소송업무 •교량유지관리			•가로등보안등 신설 및 교체 •가로등보안등 유 지 관 리			•하수도시설물 정비 및 관리 •하 수 도 공기업 운영 •하 수 도 배수설비 허가 •하수도원인자 부 담 금 부과 및 징수				•하천시설물 정비 및 관리 •골 재 채 취 허가 및 단속 •하천,구거부지 점․사용 허가 및 사용료 징수 •폐 천 부 지 관 련 업 무 •하천개수 및 기성제 정비			•재난예방안전 계획수립,집행 •재해취약시설 안전점검관리 •인력동원관련 업무 및 주민 신고망 편성관리 •민방위 자원 관리 및 대상자 교 육 실 시 •화 생 방 관 련 업 무

□ 정‧현 원

구 분	계	5 급	6 급	7 급	8 급	9 급	비 고
정 원	33	1	9	11	6	6
현 원	30	1	11	9	6	3
증 감	△3		2	△2		△3

※ 무기계약 근로자 14명(공무직)

□ 도    로

구 분	전주시 (㎞)	완 산 구		비 율 (%)	비 고
		노 선 수	연 장(㎞)
계	684	937	336	49.1
국 도	64	4	20	31.2
지 방 도	22	2	16	72.7
시 도	598	931	300	50.1

※ 자전거도로 : 46개 노선 136㎞

□ 도로시설물

구 분	계	교 량	육 교	지하보도	언더패스	지하차도	터 널	비 고
전주시	168	124	16	6	15	5	2
완산구	67	49	5	4	7	1	1

□ 차     량

종 류	규 격	수 량	보관장소	비 고
굴 삭 기	0.6㎥	1대	도로관리소	도로 유지 관리용
덤프트럭	8톤	1대	〃	〃
다목적차	7톤	1대	〃	〃
더 블 캡	1톤	1대	〃	〃
소형승용	1,000cc	1대	구청 주자창	도로민원 처리용
중형승합	2,497cc	1대	구청 주차장	건설기계단속용
덤프트럭	1톤	1대	구청 주차장	하수도 유지 관리용
더 블 캡	1톤	1대	준설원대기소	〃
〃	1톤	1대	구청 주차장	하천 관리용
고소작업차	2.5톤	1대	〃	보안등 유지 관리용
〃	3.5톤	1대	〃	가로등 유지 관리용
소형화물	2,497cc	1대	〃	재난방재용

□ 도시계획 면적

(단위 : ㎢)

구 분	계	완산구	덕진구	비 고
전 주 시	206.28	95.71	110.57	46.4%

□ 도시계획 용도지역

(단위 : ㎢)

구 분	계	완 산 구	덕 진 구	비 고
계	206.28	95.71	110.57	46.40%
주거지역	35.23	18.65	16.58	52.94%
상업지역	4.50	2.05	2.45	45.55%
공업지역	6.28	0.35	5.93	5.57%
녹지지역	151.62	74.39	77.23	49.06%
기 타 (관리,농림,자연환경)	8.65	0.27	8.38	3.12%

□ 도시계획도로 미집행현황

도로 시설명		구간수(개소)		연 장 (M)		미집행율
등 급	류 별	전 체	미집행	전 체	미집행
합 계		1,854	222	378,618	53,161	14.0％
소 계		173	25	132,756	22,828	17.2％
중 로	1 (20M)	43	10	63,540	11,336	17.8％
	2 (15M)	70	8	42,069	6,905	16.4％
	3 (12M)	60	7	27,147	4,264	15.7％
소 계		1,681	197	245,862	30,333	12.3％
소 로	1 (10M)	230	29	48,485	5,741	11.8％
	2 ( 8M)	581	89	101,753	15,071	14.8％
	3 ( 6M)	870	79	95,624	9,521	10.0％

□ 가로등․보안등

(단위 : 등)

구 분	계	가 로 등	보 안 등	비 고
전주시	34,651	14,697	19,954	터널․지하차도 등 3,167등 별도
완산구	17,882	8,188 (44개노선)	9,694 (18개동)	터널․지하차도 등 730등 별도

□ 하     천

구 분	전 주 시		완 산 구		비율/개수율 (%)	비 고
	개소	연장(㎞)	개소	연장(㎞)
계	24	102.20	11	49.49	48.42/88.52
국가하천	3	14.80	0	0	0/0
지방하천	18	81.40	9	46.49	57.11/79.04
소 하 천	3	6.00	2	3.00	50/98

□ 특정관리대상 시설물

(단위 : 개소)

구분	합계	시 설				건 축 물
		소계	도로 시설	유기 시설	절개지 기 타	소계	공 동 주 택	다 중 이 용 시 설	지 방 공 공 청 사	대 형 광고물	대 형 건축물	기타
전주시	1,816	55	40	1	14	1,761	1,057	552	41	56	38	17
완산구	905	21	17		4	884	580	228	18	22	31	5

□ 민방위대 조직

(2014. 1. 31.기준)

구분	계		지역민방위대		직장민방위대		기술지원대
	조 직	인 원	조 직	인 원	조 직	인 원	조 직	인 원
전주시	1,172	41,409	1,100	38,851	70	2,436	2	122
완산구	641	22,534	603	21,467	37	985	1	82

□ 민방위 시설

(단위 : 개소)

구분	계	민방공대피소	경보싸이렌	비상급수시설	비 고
전주시	486	364	17	105
완산구	311	232	9	70

※ 정부지원시설(전주시) : 35개소(대피시설 8, 경보시설 17, 비상급수 10)

※ 정부지원시설(완산구) : 18개소(대피시설 3, 경보시설  9, 비상급수  6)

주요업무 추진상황계획

깨끗하고 쾌적한 도로관리

○ 각종 도로시설물을 정비하여 보행자와 차량통행에 원활을 기하고,

○ 깨끗하고 쾌적한 도로환경 조성으로 명품도시 전주 이미지 제고

□ 사업개요

○ 정비대상 : 관내 포장도로 937개 노선, 336km

○ 정비인력 : 총13명(도로보수원 10, 운전원 3)

○ 보수장비 : 총5대(덤프, 다목적차, 굴삭기, 더블캡, 로울러 각 1대)

○ 사업예산 : 2,700백만원(시비 2,200 , 특교 500)

□ 추진상황

○ 노후도로 재포장(290a/725백만원)

- 아중로, 우전로, 천잠로, 장승배기로, 난전들로, 팔달로 등

○「연간단가계약」도로 및 시설물 유지관리(140개소/700백만원)

- 도 로 유 지 : 소규모 재포장 및 과속방지턱 정비 55개소

- 인 도 유 지 : 인도 및 경계석 등 보수 45개소

- 시설물 유지 : 안전펜스 및 가드레일 등 보수 40개소

○ 도로시설물 자체 보수(1,060개소)

- 포트홀 보수 900개소, 인도 보수 130개소, 볼라드 정비 30개소

□ 금후계획

○ 춘향로(남원선) 중앙분리대 설치	’14. 7.

○ ‘14년도 하반기 노후도로 재포장공사 추진	’14. 7.～10.

- 온고을로, 백제대로, 송정중앙로, 전주천서로, 용리로 등

○ 도로 및 시설물 유지관리(연간단가계약)	’14. 7.～12.

- 도로 포트홀 및 인도보수, 도로시설물 및 과속방지턱 정비 등

인도 보행환경 개선 사업

장기 미개설 도로 및 협소한 기존도로 신설･확장을 통해 도시가로망   확충을 중점 추진하여 교통흐름 개선 및 통행안정성 확보

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 관내

○ 사업내용 : 양지마을 소로개설 등 12개 노선( L = 4,195m )

○ 사업기간 : 2006년 ～ 2015년

○ 사 업 비 : 146억원(기투자 94, '14년 40, 이후 12)

□ 추진상황

사 업 명	사업내용	추진사항	총 사업비	기 투자액	‘14년	비고
계	L=4,195m		14,620	9,348	4,042
평화1동 양지마을 소로	L=230m	‘13. 12.~ 14. 9.	1,600	1,600		이월사업
중화산동 진북터널 인근 소로	L=129m	‘13. 12.~ 14. 6.(준공)	1,100	1,100		이월사업
서서학동 광진@앞 소로	L=170m	‘13. 12.~ 14. 9.	500	500		이월사업
삼천3동 주민센터 앞 도로확장	L=180m	‘13. 11.~ 14. 4.(준공)	730	730		이월사업
효자4동 우전중학교옆 소로	L=45m	‘13. 11.~ 14. 6.(준공)	170	170		이월사업
강변로 인도보행로 조성	L=1548m	‘13. 11.~ 14. 10.(준공)	500	200	300	광특 300
평화2동 현대정형외과 뒤 소로	L=128m	12필지 중 11필지 보상 완료	1,400	500	600	재배정 300
중화산동 한신코아옆 소로	L=315m	36필지 중 16필지 보상 완료	1,400	600	300
전동성당 옆 소로개설	L=86m	11필지 중 9필지 보상 완료	800	540	250
서노송동 시민약국옆 소로	L=74m	6필지 중 2필지 보상 완료	1,100	330	350
거마평로 인도정비 사업	L=650m	‘14. 3~11.	400	0	400
평화2동 대정초교앞 도로개설	L=640m	‘13. 11~’14. 9.	4,920	3,078	1,842	이월사업

○ ‘14년도 보상대상 토지 지적분할 및 감정평가 의뢰	’14. 05.

□ 금후계획

○ 평화2동 대정초교앞 도로개설 준공	’14. 09.

○ 평화2동 현대정형외과옆 등 4개소 용지보상	’14. 09.

○ ‘13년도 이월사업 및 거마평로 인도정비사업 완료	’14. 11.

※ ‘14년 보상완료 사업 ’15년 예산확보 후 공사추진

양지마을 평화초교		진북터널
평화동 양지마을 소로		중화산동 진북터널 인근 소로
광진@		삼천3동주민센터
서서학동 광진@ 옆 소로		삼천3동 주민센터 부근 사거리 정비
우전중학교		이동교 마전교
효자4동 우전중학교옆 소로		강변로 인도보행환경 조성
평화사거리		한신코아@
평화2동 현대정형외과 옆 소로		중화산동 한신코아 옆 소로
전동성당		중앙성당
전동성당 옆 소로		서노송동 시민약국 옆 소로

교량 보수‧보강 사업

○ 싸전다리 등 4개소 교량을 조기 보수․보강하여 통행차량 안정성 확보

○ 교량 정밀점검을 실시하여 노후교량 재난사고를 사전에 예방

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 관내

○ 사업내용 : 교량 보수‧보강, 교량정밀안전점검

○ 사업기간 : 2014. ～ 2015.

○ 사 업 비 : 1,977백만원(시884 , 특교1,093)

- 교량보수 4개소/1,877, 정밀안전점검 15개소/100

※ 전주시 교량 현황 : 117개 (완산 49, 덕진 68)

□ 추진상황

○ 삼천1교 신축이음장치 보수공사	’14. 3. 28.

○ 효자다리 등 15개 교량 정밀점검용역 착수	’14. 4. 07.

○ 석구교, 서곡교 보수공사 완료	’14. 5. 23.

○ 우기철 대비 교량 배수구 청소 용역 시행	’14. 6. 04.

○ 싸전다리 보수·보강공사 실시설계용역 완료	’14. 6. 16.

○ 봉암교 보수공사 실시설계용역 착수	’14. 6. 23.

□ 금후계획

○ 효자다리 등 15개 교량 정밀점검용역 완료	’14. 8.

○ 봉암교 보수공사 완료	’14. 9.

○ 싸전다리 일괄 보수·보강공사 시행	’14. 7. ～ 12.

가로등 ․ 보안등 유지관리

○ 관내 전 지역 밝은 밤거리 조성으로 야간 범죄 및 교통사고 예방

○ 신속한 민원처리로 주민 불편 최소화, 우기대비 일제정비로 안전사고 방지

□ 사업개요

○ 관리등 수 : 17,882등

- 가로등 8,188등(44개 노선/195㎞), 보안등 9,694등(관내 18개동)

○ 인력 및 장비 : 4명 / 고소 작업차량 2대

○ 사업예산 : 650백만원

- 신설 및 유지보수(민원처리) 470, 우기대비 안전진단 및 정비 80,        보안등 점멸기 교체사업 100

□ 추진상황

○ 해빙기 조명시설 안전점검	‘14. 3. 10.∼3. 19.

○ 가로등·보안등 신설 및 정비(69건)	‘14. 1.∼6.

○ 가로등·보안등 유지보수(3,530건)	‘14. 1.∼6.

○ 가로등 전기설비 안전진단	‘14. 5. 1.∼6. 30.

□ 금후계획

○ 태풍대비 가로등 시설물 안전점검 및 보수	’14. 7.∼9.

○ 가로등 전기설비 안전진단 및 부적합 일제정비	’14. 7.∼11.

○ 노후 보안등점멸기 교체	’14. 7.∼12.

○ 가로등․보안등 신설 및 유지보수	’14. 7.∼12.

생태하천 정비 및 유지관리

청결하고 쾌적한 하천환경을 조성하여 하천을 이용하는 시민에게

친수공간 제공 및 하천제방․시설물 유지관리 철저로 사전 재해예방

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주천, 삼천 등 11개 하천 / 49㎞

○ 사업내용

- 하천 위험지역 안전시설 설치 및 유지관리

- 하천 환경정비(쓰레기 수거 및 산책로주변 풀베기 등)

- 하천 시설물 (편익․운동시설 및 산책로) 유지보수

○ 사업기간 : 2014. 1. ～ 12.

○ 사 업 비 : 200백만원

□ 추진상황

○ 하천시설물 정비 및 보수 완료 (17개소/80백만원)

- 무단경작지 10, 하상 3, 제방법면 2, 계단 2

○ 하절기 교량 불법시설물 행정대집행 (2개소/3백만원)

○ 산책로 주변 풀베기 등(2회), 생태유해식물 제거 (A=45,000㎡)

○ 하천내 유수소통 지장수목 제거 (A=15,000㎡)

○ 하천시설물 정비 완료 (99개소/70백만원)

- 운동기구 45, 산책로 20, 목재계단 34

□ 금후계획

○ 하천 구역내 무단경작지 및 불법시설물 정비	’14. 7.～10.

○ 하천내 풀베기 및 유해식물 제거	상반기(6월), 하반기(9월)

○ 쾌적한 하천환경을 위한 쓰레기 및 각종 부유물 제거	연 중

○ 하천시설물 정비 및 보수	연 중

⇒ 지속적 하천 순찰 및 신속한 유지 보수로 시민 불편 최소화

동완산동 서민밀집 위험지역 정비

○ 재난취약지역의 정비사업 추진으로 재난예방 및 주민생활편의 도모

○ 재개발 및 재건축 등 사업에서 소외된 재난안전 사각지역 해소

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 동완산동 402-5번지 일원

○ 사업내용 : 사면보강(석축 및 옹벽설치), 산마루측구정비, 배수로 정비,

노후 골목길 포장, 안전난간설치, 폐가 및 공가정비 등

○ 사업기간 : 2014. 1. ∼ 11.

○ 사 업 비 : 1,213백만원 (국비 500, 특교세 213, 시비 500)

□ 추진상황

○ 서서학동 공수내지구 정비완료(50개사업/1,000백만원)	’12. 10.

○ 교동 서민밀집 위험지역 정비완료(206개사업/1,800백만원)	’13. 12.

○ 동완산동 서민밀집 위험지역 사업 공모 및 확정	’13. 10.

○ 특별교부세 확보(213백만원)	’13. 12.

○ 동완산동 서민밀집 위험지역 실시설계 용역 착수	’14.  2.

○ 주민의견수렴 및 유관기관 협의	’14.  4.

○ 원가심사 및 일상감사 완료	’14.  6.

□ 금후계획

○ 사전 사업설명 및 주민협조 홍보	’14. 7.

○ 공사착공 및 완료	’14. 7.∼11.

『재난 ․ 재해 취약지역』집중 관리

○ 한 단계 빠른 재난·재해 취약지역 사전 안전점검 실시로 대형사고 예방

○ 위험요소 응급조치 및 복구 사업추진으로 인명 및 주민의 재산      피해 최소화

□ 현    황

○ 해빙기 대비 재난취약시설 안전점검

- 대    상 : 66개소(재해위험시설 50, 중점관리시설 16)

○ 특정관리대상 안전점검

- 대    상 : 905개소(시설물 21, 건축물 884)

○ 민방위 시설 유지관리

- 대    상 : 18개소 / 140백만원

□ 추진상황

○ 해빙기 재난취약시설 점검	’14. 2.～3.

○ 점검결과 위험요소 응급조치 및 복구사업 추진	’14. 3.∼4.

- 효자2동 협동연립 등(8개소/213백만원)

○ 상반기 특정관리대상시설 점검	’13. 2.～5.

○ 상반기 민방위시설 점검 및 정비	’13. 3.∼6.

○ 총체적 안전점검 실시(위험지역 및 특정관리시설물)	’13. 3.∼6.

○ 총체적 안전점검에 따른 재난 재해위험 시설 기금요청	’14. 6.

□ 금후계획

○ 총체적 안전점검에 따른 기금 재배정 확정 시 추진	’14. 7.∼10.

○ 하반기 특정관리대상시설 점검	’14. 7.∼10.

○ 하반기 민방위시설 점검	’14. 7.∼10.

시민불편지역 정비 사업

○ 완산구 관내 이면도로 및 골목길 일원 주민들의 불편사항을 해소

○ 쾌적한 도로환경 조성으로 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 관내

○ 사업내용 : 중화산로 재포장 사업 등 35개소

- 도로정비 25 / 시설물정비 4 / 배수로정비 6개소

※ 인도정비, 아스콘 덧씌우기, 가드레일 보수, 하수관확대 등

○ 사업기간 : 2014. 1. ～ 2014. 7.

○ 사 업 비 : 953백만원

□ 추진상황

○ ’13년도 시민불편지역 공사완료	’14. 2.

- 태평동 유마트옆 골목포장 등 20개소 / 514백만원

○ ’14년도 시민불편지역 실시설계용역	’14. 2.

○ ’14년도 공사계약 및 착공	’14. 3.

○ 공사완료(33개소)	’14. 5.

○ 공사발주 및 착공(2개소)	’14. 7. ∼

□ 금후계획

○ 공사완료(2개소)	’14. 7.