제312회 전주시의회 임시회

도  시  건  설  위  원  회

2014년도

주요업무 추진상황 보고

아트폴리스담당관

보  고  순  서

□	일 반 현 황	-------	2
□	담 당 별 주 요 기 능	-------	3
□	기 본 현 황	-------	4
□	주요업무 추진상황	-------	5

일  반  현  황

□ 기    구

아트폴리스담당관

아트폴리스

도 시 경 관

공공디자인

도심활성화

□ 정․현원

구 분	총 계	일 반 직					기능	비고
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	13	1	5	6	1	0	0
현 원	13	1	5	6	1	0	0

담당별 주요기능

담당별	분 장 사 무
아트폴리스	○ 전주 아트폴리스 정책 총괄 ○ 전주시 경관위원회 운영 ○ 경관계획 및 경관성 검토 협의업무 ○ 경관 개선사업 추진
도시경관	○ 옥외광고물 개선 종합계획 수립 ○ 옥외광고물 관리 및 정비에 관한 업무 총괄 ○ 전주시 광고물관리 및 디자인 심의위원회 운영 ○ 간판이 아름다운 시범거리조성사업
공공디자인	○ 공공디자인 자문에 관한 사항 ○ 공공디자인 가이드라인 운영 ○ 공공디자인 개선사업 ○ 공공디자인 DB 구축
도심활성화	○ 도심활성화 계획 수립 및 사업 시행 ○ 전문 특화거리 조성 및 지원에 관한 사항 ○ 경관광장 조성에 관한 사항

기  본  현  황

□ 각종 위원회 현황

(단위 : 명)

위원회명	설 치 근 거	임 무	계	공무원	시의원	민간위원		운영 횟수
						남	여
경관위원회	경관법 제25조	전주시 경관조례 제20조 (경관위원회의 구성 및 운영)	20	1	1	15	3	수시
광고물관리 및디자인 심의 위원회	옥외광고물 등 관리법 시행령 제32조	전주시 옥외광고물 등 관리조례 제12조(광고물관리및디자인심의위원회 구성·운영)	8	3	-	3	2	수시
옥외광고정비기금운용심의위원회	옥외광고물 등 관리법 제6조의2	전주시 옥외광고정비기금 설치 및 운용 조례 제5조(기금운용관리심의)	7	3	1	2	1	수시

□ 광고업 등록 및 옥외광고물 현황

(단위 : 개/개소)

광고업자 등록현황	옥외광고물	시 지 정 광 고 시 설
		계	게시대	벽보판	기 타	비 고
330	36,010	250	150	100	-	‘12.11.1일 전주시설관리 공단으로 재위탁(3년간)

주요업무 추진상황

□	한국전통문화전당 주변 특색거리 조성	----	6
□	아중저수지주변 산책로 조성	----	7
□	백제대로 경관거리 조성	----	8
□	황방산(서고사)주변 시나브로길 조성	----	9
□	풍남문 로터리 간판개선	----	10
□	기린공원 샘터 갈랫길 조성	----	11
□	성장거점지역 특정경관계획 수립	----	12

한국전통문화전당 주변 특색거리 조성

○ 한옥마을, 전주부성 내 특화거리인 영화의 거리 등과 전당을 연결

하는 관광벨트 구축 및 한스타일 아름다운 이미지를 테마로 한 특색

있는 거리 조성

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 경원동3가 한국전통문화전당 주변 길

○ 사업규모 : 특색거리 조성(6개 노선, L=1,745m), 오거리광장 정비 1식,진입 게이트 설치(2개소), 쌈지공원 조성(2개소)

○ 총사업비 : 6,000백만원(국 3,000 도 2,830 시 170)

(단위 : 백만원)

구 분	계	2013년	2014년	2015년 이후	비고
계	6,000	2,300	1,900	1,800
국 비	3,000	1,300	900	800
도 비	2,830	1,000	830	1,000
시 비	170	0	170	0

○ 사업기간 : ’13. 01. ∼ ’15. 12.

□ 추진상황(공정 45%)

○ 기본(디자인) 설계 용역 완료	: ’13. 05.

○ 교통안전시설심의위원회 심의	: ’13. 07.

- 노선 : 한국전통문화전당 후문(동문1길) 통행체계 변경(양방→일방)

○ 실시설계 용역(조형물 및 특화거리 조성) 완료	: ’13. 10.

○ 총괄입찰 후 공사 착공	: ’14. 01.

○ 동문1길 전북정보산업지원센터 담장공사 완료	: ’14. 04.

○ 관청1·2길(L=296m) 지중화공사 및 인도조성 완료	: ’14. 06.

□ 금후계획

○ 1차 계약분 공사 추진	: ’14. 07.∼12.

- 4개 노선(L=1,449m) 지중화공사 및 인도조성

○ 2차분 공사 추진	: ’15. 01.∼12.

- 오거리문화광장 정비 및 쌈지공원 조성

아중저수지 주변 산책로 조성

○ 아중저수지에 수상 산책로를 조성하고 주변 환경 개선을 통하여

시민 및 관광객들에게 친환경적 여가활용 공간 제공

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 우아동 1가 아중저수지 내

○ 사업규모 : 수상데크 산책로 L=815m, 수상광장  2개소, 경관데크  2개소,

경관조명 1식, 기타시설 1식

- 1차 구간(2009년) : 산책로 L=287m, 경관조명 1식

- 2차 구간(2013년) : 산책로 L=67m, 수상광장 1개소, 경관조명 1식

- 3차 구간(2014년) : 산책로 L=420m, 수상광장 1개소, 경관조명 1식

- 잔여 구간(2015년) : 산책로 L=41m, 경관데크 2개소, 경관조명 및 기타시설 1식

○ 총사업비 : 6,500백만원(1차 1000,  2차 1000,  3차 2000,  잔여 2500)

○ 사업기간 : ’09. ∼ ’15.

□ 추진상황

○ 1차 구간 준공	: ’09. 12.

○ 2차 구간 준공	: ’13. 08.

○ 3차 구간 착공(현공정 35%)	: ’14. 04.

- 기둥(강관파일 ∮250mm) 185개 설치완료

□ 금후계획

○ 3차 구간 준공	: ’14. 12.

○ 잔여 구간 시행	: ‘15. 02.∼12.

백제대로 경관거리 조성

○ 전주 관문인 전주역 중심 백제대로 주변의 어둡고 침체되어 있는

거리를 밝고 활력 있는 경관거리로 조성하여 도시이미지 향상 및

역세권 활성화 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 우아동 전주역광장∼명주골 사거리

○ 사업내용 : 인도 정비, 경관조명 및 상징조형물 설치, 쌈지공원 조성

○ 사업규모 : 경관거리 조성 L=750m, B=20m

○ 사 업 비 : 1,800백만원(2014년 - 1,000백만원)

○ 사업기간 : ’14. 02. ∼ ’15. 12.(2개년)

□ 추진상황

○ 용역과제심의위원회 심의	: ’14. 02.

○ 기본·실시설계 용역 원가심사 및 일상감사	: ’14. 02.

○ 기본·실시설계 용역 착수	: ’14. 04.

□ 문제점 및 대책

○ 총사업비가 1,800백만원 정도 소요되나 1,000백만원 일부 확보로

일시완공 불가

⇨ 경제성과 사업효과 등을 종합적 검토 후 사업효과가 있는 구간부터 우선 사업 시행

□ 금후계획

○ 전주시 경관위원회 사전 자문 및 검토	: ’14. 08.

○ 공사 착공	: ‘14. 10.

○ 공사 준공	: ‘15. 12.

황방산(서고사) 주변 시나브로길 조성

○ 전북 혁신도시 본격적인 입주와 만성동 법조타운 개발로 황방산

일대가 도심 속으로 들어옴에 따라 누구나 쉽게 찾고 거닐 수 있는

친근한 자연 문화 공간 창출

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 만성동 황방산공원 진입로(서고사 주변)외 1개소

○ 사업내용 : 황방산 이용객 편의시설 및 안내판 설치, 진입로 정비

○ 사업규모 : 퍼걸러 2개소, 벤치 7개소, 안내판 8개소, 기타 산책로 정비 1식

○ 사 업 비 : 100백만원

○ 사업기간 : ’14. 05. ∼ 12.

□ 추진상황

○ 세부사업계획 수립	: ’14. 05.

○ 실시설계	: ’14. 05.

○ 일상감사 및 발주	: ’14. 06.

□ 문제점 및 대책

○ 시설물 설치 시 산책로(서고사 진입로)가 사유지 내에 있어 토지주 협의 필요

⇨ 토지주와 협의가 불가능할 경우 국·공유지 위주로 사업 시행

□ 금후계획

○ 공사 착공	: ’14. 07.

○ 공사 준공	: ’14. 12.

풍남문 로터리 간판개선

○ 풍남문 주변 영세상가의 난립된 간판과 노후된 건물입면을 주변 보전권역

경관과 어울리게 개선하여 구도심 활성화 및 전통문화 정체성 확립 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 전동 풍남문 로터리 주변

○ 사업대상 : 로터리 주변 상가 60여 개소

○ 사 업 비 : 452백만원[국(기금) 205, 시 205, 주민자부담(10%) 42]

○ 사업기간 : ’14. 09. ∼ 12.

□ 세부 사업내용

○ 불법 및 노후간판 정비(131개) 및 신규 간판 설치(80여개 정도)

○ 건물 노후에 따른 건물벽면(파사드) 개선(상가 60여 개소)

□ 추진상황

○ 사업 필요성 및 제안 설명(중앙부처 방문)	: ’13. 02.

○ 사업 추진을 위한 주민협의체 구성	: ’13. 07.

○ 주민설명회(2회) 및 사업추진 주민동의서 징구	: ’13. 06./12.

○ 공모사업 선정 및 국비(기금 205백만원) 송금	: ’14. 02.

○ 간판 우수지역 견학(안행부) 및 컨설팅(옥외광고센터)	: ’14. 04.

○ 간판정비시범구역 지정	: ’14. 05.

○ 간판개선사업계획  수립	: ’14. 06.

□ 금후계획

○ 제1회 추경예산 매칭 시비 확보(205백만원)	: ’14. 08.

○ 사업 발주 및 착수	: ’14. 09.

○ 사업 완료	:  ’14. 12.

※ 국비 지원 공모사업 지속 신청(’14. 12월경)

기린공원 샘터 갈랫길 조성

○ 오목대에서 이어지는 자만마을, 낙수정마을, 기린공원, 아중저수지를

연결하는 둘레길을 조성하여 한옥마을을 찾는 관광객 및 시민을 위해     분리된 거점공간의 유기적 연계를 통한 새로운 관광루트 개발 및 생활     밀착형 휴식 공간 확대

□ 사업개요

○ 위    치 : 기린공원 약수터~아중저수지 주변 중심

- 둘레길 코스 : 오목대∼자만마을∼옥류마을∼낙수정마을∼군경묘지

∼기린공원(동고산성 북문터∼약수터)∼아중저수지 산책로

○ 사업내용 : 기린공원 샘터 갈랫길 경관개선

- 휴식공간 조성, 노후 안내판 및 편의시설 정비, 꽃길  조성

○ 총사업비 : 100백만원

○ 사업기간 : ’14. 05. ∼ 10.

□ 둘레길 추진현황

【 자만·낙수정·옥류마을 경관조성 】▶ 647백만원

○ 자만마을 벽화 조성(127백만원 / 도란도란 시나브로길 조성)

- 사업기간 : ’12. 08.∼11.

- 담장 벽화 도색(46개소), 오목대 육교 도색, 안내표지판(6개소)

○ 낙수정마을 커뮤니티공간 조성(130백만원 / 지역공동체 일자리사업)

- 사업기간 : ’13. 03.∼06.

- 아트 도색(260m), 아트펜스 설치(130m), 파고라 및 데크 설치(2개소) 등

○ 옥류마을 사잇길 조성(390백만원 / 지역공동체 일자리사업)

- 사업기간 : ’13. 07.∼11.

- 전망대 및 포토존 1식, 군경묘지 앞 쉼터 1식, 커뮤니티공간 조성 2식 등

□ 추진상황

○ 지역주민 및 관계부서 협의 완료	: ’14. 05.

○ 기본계획 수립	: ’14. 06.

○ 실시설계	: ’14. 06.∼07.

□ 금후계획

○ 공사 시행	: ’14. 08.∼10.

성장거점지역 특정경관계획 수립

○ 대표 관광지인 한옥마을 외 지역을 중심으로 성장 잠재력이 높고

사업효과를 주변지역까지 확산시킬 수 있는 성장거점지역을 선정,

○ 새로운 경관구조를 만들기 위한 타당성을 검토하고 기본전략 및

밑그림(디자인)을 제시하는 특정경관계획으로 새롭고 창의적인

아트폴리스 경관구조 실현

□ 추진방향

○ 전주시 진입부의 도시 이미지 재정립을 위한 가로환경 개선

- 전주 방문객들에게 우리 시에 대한 인상적인 이미지 제공

○ 지역 주민 삶의 질 향상을 위한 경관 개선

- 권역별 지역 환경 및 자원을 활용한 시민 휴식 공간 조성

○ 기존 구도심 지역 중 그동안 소외된 지역의 경관 개선

- 쾌적하고 수준 높은 가로환경으로 도시 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 사업내용 : 경관구조 설정, 타당성검토 및 기본(디자인)계획 등

○ 사 업 비 : 157백만원

○ 사업기간 : ’14. 07. ～ ’15. 06.

□ 추진상황

○ 기본계획 수립	: ’14. 04.

○ 용역 발주(협상에 의한 계약)	: ’14. 05.

○ 제안서 평가	: ’14. 07.

□ 금후계획

○ 용역 착수	: ’14. 07.

○ 용역 완료	: ’15. 06.