제312회 전주시의회 임시회

도  시  건  설  위  원  회

2014년도

주요업무 추진상황 보고

도 시 재 생 사 업 단

보  고  순  서

□	일 반 현 황		-------	1
□	부 서 별 주 요 기 능		-------	2
□	기 본 현 황		-------	3
□	주요업무 추진상황
	○	도 시 재 생 과	-------	4
	○	신 도 시 사 업 과	-------	15
	○	스 포 츠 타 운 조 성 과	-------	25

일  반  현  황

□ 기    구 : 3과 11담당

									도시재생사업단
	도 시 재 생 과 (4담당)									신도시사업과 (3담당)								스포츠타운조성과 (4담당)
	도시재생기획담당									택지개발담당								컨벤션기획담당
	해피하우스담당									공공기관이전담당								컨벤션유치담당
	마을만들기담당									에코시티담당								스포츠타운담당
	재생사업담당																	스포츠시설관리담당

□ 인    력

과 별	총 계		일 반 직						비고
			4급	5급	6급	7급	8급	9급
계	정원	43	1	3	11	15	11	2
	현원	41	-	3	10	24	4	-
도시 재생과	정원	14	-	1	4	4	4	-
	현원	13	-	1	3	7	1	-
신도시 사업과	정원	15	-	1	3	4	5	2
	현원	15	-	1	3	9	2	-
스포츠타운 조성과	정원	14	-	1	4	7	2	-
	현원	14	-	1	4	8	1	-

부서별 주요기능

과 별	분 장 사 무
도 시 재 생 과	○ 도시재생 종합계획 수립 및 정책개발에 관한 사항 ○ 도시재생 시민공감사업 추진 ○ 해피하우스 종합계획 수립 및 사업 시행 ○ 해피하우스센터 운영 및 서비스 제공 ○ 마을재생 종합계획 수립 및 사업 시행 ○ 마을만들기 리더 양성 및 포럼 운영 ○ 주민참여 지역역량강화사업 시행 ○ 도시재생 시범사업 발굴 및 계획수립에 관한 사항 ○ 도시활력증진지역 개발사업 발굴 및 사업 시행 ○ 자력수복형 지역역량강화사업 시행
신 도 시 사 업 과	○ 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립 ○ 택지개발사업 계획 및 공사시행 ○ 신시가지 조성 및 행정절차 이행에 관한 사항 ○ 혁신도시 건설사업 추진 ○ 부대이전 및 부지개발에 관한 사항 ○ 교도소 이전사업 등
스포츠타운 조 성 과	○ 컨벤션센터 건립 및 스포츠타운 조성사업 ○ 위탁체육시설 관리(시설관리공단) ○ 공공체육시설 확충사업 ○ 공공체육시설 보수 및 정비사업 ○ 마을단위 소규모 체육시설 관리

기  본  현  황

□ 택지개발 현황

구 분	계		완 료		추 진 중
	개소수	면 적(㎡)	개소수	면 적(㎡)	개소수	면 적(㎡)
합 계	30	23,567,490	26	15,697,848	4	7,869,642
구획정리	12	6,819,077	12	6,819,077	-	-
택지개발	13	6,342,924	13	6,342,924	-	-
도시개발	5	10,405,489	1	2,535,847	4	7,869,642

□ 공공체육시설 현황

개소수	전문체육시설	생활체육시설	비고
계	8개소	10개소
18개소	월드컵경기장, 종합경기장 실내체육관, 완산수영장 경 륜 장, 화산체육관 야 구 장, 빙상경기장	실․내외 인라인롤러경기장 실내배드민턴장, 승 마 장 게이트볼구장, 론 볼 링 장 덕 진 수 영 장, 완산체육공원 덕진체련공원, 아중체련공원

도시재생과  소 관

Ⅰ.	전주 도시재생 추진체계 구축	----	5
Ⅱ.	도시재생 지원센터 개관 추진	----	6
	□ 도시재생 지원센터 건립
	□ 도시재생 지원센터 기능배치 및 운영
Ⅲ.	도심 노후쇠퇴지역 환경개선	----	8
	□ 중앙시장 고객소통 골목길 정비
	□ 천사마을 커뮤니티 공간조성
	□ 기부천사 쉼터 정원 조성
Ⅳ.	시민참여형 도시재생 프로그램 운영	----	11
Ⅴ.	자력적 마을재생 전문가 및 리더 양성	----	12
Ⅵ.	지역공동체 활성화를 위한 마을재생 지원	----	13
Ⅶ.	노후주거지 해피하우스 운영 지원	----	14

전주 도시재생 추진체계 구축

○ 도시재생 특별법에 근거한 종합적이고 체계적인 도시재생 전략계획 수립

○ 도시재생사업 활성화를 위한 추진체계 구축 및 지원을 위한 조례 제정

□ 사업개요

○ 사업내용 : 도시재생 전략계획 수립, 도시재생 지원조례 제정

○ 사 업 비 : 200백만원 (전략계획 및 활성화계획 수립)

□ 추진계획

《 10개년 도시재생 전략계획 수립 》

○ 계획의 개요

- 계획범위 : 시간적 범위(10개년), 공간적 범위(인구·사업체 감소지역, 주거환경 악화지역)

- 전략계획 내용

· 도시재생의 비전과 목표 설정, 목표에 따른 달성 계획 제시

·「도시재생활성화지역」설정과 지역별 우선순위 지정 및 사업계획 등

○ 추진일정

- 과업지시서 작성 및 용역 수행 행정절차 이행	’14.  7 ～ 9월

- 도시재생 전략계획 수립 용역 추진	’14.  9 ～ ’15. 2월

- 도시재생 전략계획 입안 및 국토부 공모 신청	’15. 상반기

《 도시재생 지원조례 제정 》

○ 조례의 주요내용

- 도시재생위원회 구성, 도시재생지원센터 설치·운영 등 추진체계

- 건축규제 완화 특례, 보조․융자 등 활성화 지원에 관한 사항

○ 추진일정

-「도시재생 지원 조례」입안	’14.  7 ～  8월

- 관계부서 협의·승인 및 입법예고	’14.  9 ～ 10월

- 원안심사 및 시의회 의결	’14. 11 ～ 12월

- 조례 시행	’15. 1월

도시재생 지원센터 개관 추진

□ 도시재생 지원센터 건립

도시재생의 물리, 환경, 사회․문화 등 통합적 기능은 물론, 전국적으로 도시재생을

선도해 나갈수 있는 모델이 되도록 창의적이고 특색 있는 지원공간 마련

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 물왕멀 3길 29외 9필지(노송동 천사마을지구내)

○ 규    모 : 연면적 4,951㎡(지하1층, 지상3층), 부지면적 3,748㎡

○ 세부내용 : 주민복리공간, 경제재생 활동공간, 순환형 임대주택 등

○ 사업기간 : 2012 ～ 2015년

○ 사 업 비 : 90억원(국비 45, 시비 45)

□ 추진상황

○ 천사마을 가꾸기 사업 국토부 공모사업 선정	’11. 11월

○ 지원센터 건립 지방재정투융자 심사 전북도 승인	’11. 11월

○ 지원센터 건립 공유재산관리계획 시의회 동의	’12.  2월

○『도시재생 지원센터』건립 설계공모 공고	’12. 11월

○ 기본 및 실시설계	’13.  7월

○ 지원센터 건립 착공	’13.12.10

□ 금후계획

○ 지원센터 1차분(골조공사) 공사 준공	’14. 10월

○ 지원센터 2차분(내부공사) 계약 및 착공	’14. 11월

○ 공사준공	’15. 하반기

□ 도시재생 지원센터 기능배치 및 운영

철거형 도시정비가 아닌 지역 공동체 중심의 통합적 기능회복(물리/경제/

주민생활 기능회복)을 위한 도시재생 지원기능 모델 제시

□ 지원센터의 기능

○ 전주시 도시재생정책 추진의 중심센터로서 기능과 역할 수행

- 도시재생전략 및 활성화계획 수립과 다양한 사업 추진의 중심 공간

○ 도시재생사업 추진주체간 협력네트워크 구축 공간

- 도시재생 유관 다양한 조직의 입주를 통한 유기적 사업추진의 시너지효과 극대화

○ 사회통합적 도시재생 실현을 위한 지원 기능

- 공동체 주민소득 지원, 지역역량강화 주민생활 재생지원, 정주환경 개선

□ 지원센터 운영방안

○ 층별 공간활용 방안

층별	면적(㎡)	주요 시설	비 고
3층	457.67	청년창업지원공간, 천사북카페, 도시재생 24시간 플라자
2층	927.4	도시재생지원센터, 해피하우스센터, 도시재생네트워크 플랫폼	순환형임대주택(2가구)
1층	1,937.24	커뮤니티 비즈니스 전시·판매 공간, 주민역량강화 교육 및 회의실	순환형임대주택(2가구)
지하	1,629.12	주차장, 기계실, 주민 작업실

○ 조직 및 관리운영

- 시 직영, 혼합직영, 민간위탁 등 장‧단점 분석 후 선택 추진

□ 금후계획

○ 도시재생지원센터 기능배치 및 운영방안 확정	’14. 하반기

○「도시재생지원센터 운영․지원 조례」제정	’15. 상반기

○ 도시재생지원센터 운영	’15. 하반기

도심 노후쇠퇴지역 환경개선

도심 쇠퇴지역중 노후상가지구와 주거지구별 도시재생 시범사업을 실시하여

살기좋은 생활환경개선을 통해 주민 삶의 질을 개선하고 마을재생을 도모

□ 중앙시장 고객소통 골목길 정비

문화의거리

떡골목길

세이브존

전주시청

□ 사업개요

○ 사업지역 : 중앙시장 내 중앙상가 주변 골목길

○ 사업내용

- 문화의거리(L=140m, B=12m) : 루미나리에 및 경관조명 시설, 도로포장 등

- 떡골목길(L= 36m, B= 2m)   : 실내 인테리어, 경관조명 시설, 간판정비 등

○ 사업기간 : 2013 ～ 2014년(2개년)

○ 총사업비 : 1,160백만원(국비 580, 시비 580)

□ 추진상황

○ 도시재생지원센터 연구진, 상인회 의견수렴	’13. 1 ～ 4월

※ 상인회 : 자부담(전력비) 및 사업추진 동의절차 완료(5～6월)

○ 한전 지중화사업 중앙심의 완료	’13. 11월

○ 지중화사업 도로굴착 심의	’14.  2월

□ 금후계획

○ 기본조사 및 실시설계	’14. 5 ～  8월

○ 공사시행	’14. 9 ～ 12월

□ 천사마을 커뮤니티 공간조성

’12년 완료

’14~’15년 추진

’13년 완료

□ 그간 추진상황

○ 2012년, 1단계 생활환경 개선사업 완료(210백만원)

- 도로정비(L=270m), 공가정비 2동, 펜스 설치, 담장도색 등

○ 2013년, 2단계 생활환경 개선사업 완료(50백만원)

- 도로정비(L=310m), 공가정비 2동, 펜스 설치, 담장도색 등

□ 3단계 생활환경 개선계획 (커뮤니티 공간조성)

○ 사업구간 : 완산구 물왕멀4길 20번지 등 18필지(1,071㎡)

○ 사업내용

- 토지 매입 및 지장물(9동) 보상후 커뮤니티 공간 조성

- 파고라, 조경식수, 벤치, 운동시설, 주차장 등

○ 사업기간 : 2014 ～ 2015년

○ 사 업 비 : 900백만원(국비 450, 시비 450)

□ 금후계획

○ 토지 및 지장물 현장조사, 협의매수 진행	’14.  3 ～ 10월

○ 기본조사 및 실시설계	’15.  3 ～  5월

○ 공사입찰	’15.  6월

○ 공사착공 및 준공	’15.  7 ～ 11월

□ 기부천사 쉼터 정원 조성

해피하우스 노송센터 노송동 주민센터 사업부지	매입계획부지

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 인봉로 7-4외 2필지(257㎡)

○ 조성내용 : 천사마을 유래, 역사기록, 조형물, 쉼터 등

○ 사 업 비 : 400백만원(국비 200, 시비 200)

○ 사업기간 : 2014. 7월 ～ 2015. 5월

□ 추진상황

○ 정원조성에 따른 지역주민과 간담회 실시	’14.  4월

○ 매입예정 토지주(2필지) 매도의사 여부 협의	’14.  5월

○ 감정평가 실시(2개사)	’14.  5월

- 태평양감정평가법인 전북지사, 경일감정평가법인 전북지사

○ 감정평가에 의한 토지주 매도승낙	’14.  6월

□ 금후계획

○ 지장물 조사(건물2동) 및 부지 매입	’14.  7 ～  8월

○ 전문가 의견 및 주민 의견수렴	’14.  8 ～  9월

○ 기본 및 실시설계	’14.  9 ～ 11월

○ 공사 착공 및 준공	’15.  2 ～  5월

시민참여형 도시재생 프로그램 운영

○ 시민에 참여기회 제공을 통한 도시재생 이해도 향상 및 관심도 제고

○ 시민과 전문가 그룹의 다양한 도시재생사업 아이디어를 발굴, 시정에

반영함으로써 시민참여형 도시재생 실현

□ 도시재생 대학생 서포터즈 운영

○ 구    성 : 6개팀 55명(도내 거주 희망 대학생)

○ 주요활동 : 도시재생 이론교육․현장체험, 팀별 과제발굴 활동 등

○ 사 업 비 : 9백만원

○ 추진상황

- 도시재생 서포터즈 모집 홍보 및 접수	’14.  3월

- 도시재생 서포터즈 오리엔테이션 및 활동	’14.  4월 ～

○ 금후계획

- 서포터즈 팀별 과제 발표회	’14.  9월

- 서포터즈 활동상황 자체평가회 및 해단식	’14. 12월

□ 도시재생사업 발굴 아이디어 공모

○ 공모대상 : 5개 분야 11개 사업

○ 응모자격 : 제한 없음

○ 시상계획 : 14개팀 9백만원

- 최우수상 1명(상장, 2백만원), 우수상 3명(상장, 각 1백만원), 장려상 10명(상장, 각 40만원)

○ 추진상황

- 도시재생사업 발굴 아이디어 공모계획 수립	’14.  3월

- 아이디어 공모 공고 및 접수	’14.  4 ～ 6월

○ 금후계획

- 아이디어 심사 및 우수작품 선정	’14.  7월

- 아이디어 입상작품 시상 및 작품 전시회	’14.  8월

- 아이디어 입상작품 시정접목 검토반영(사업부서)	’14.  8월 ～

자력적 마을재생 전문가 및 리더 양성

○ 마을재생 전문가 양성 교육과정을 운영, 마을만들기 사업 추진동력 확보

○ 주민과 전문가가 협력하여 마을공동체 복원 및 환경개선 사업등을 통한

살기좋은 마을만들기 추진

□ 사업개요

○ 사업내용 : 자생단체 임원 교육 및 코디네이터․마을리더 양성

○ 사 업 비 : 42백만원(자생단체 교육 8, 코디네이터 12, 마을리더 22)

□ 추진상황

○ 동 자생단체 임원 교육 : 495명/ 동별 15명

- 기    간 : ’14. 2. 10 ～ 2. 21 (기간 중 9회)

- 대    상 : 주민자치회, 통우회, 새마을, 부녀회, 바르게살기협의회 등

- 교육과정 : 마을만들기 이론 및 사례, 마을공동체 활성화 방안 등

○ 마을재생 코디네이터 양성과정 운영 : 30명

- 기    간 : ’14. 3. 13 ～ 4. 18 (6주 과정)

- 대    상 : 도시계획,  주거복지, 건축, 미술, 환경 분야 등 전공자

- 교육과정 : 공동체 활성화, 주민 갈등해결, 의제 찾기 및 계획수립 방안 등

○ 상반기 마을리더 양성 아카데미 운영 : 33명

- 기    간 : ’14. 6. 11 ～ 6. 26 (주 5회/ 총 12회 운영)

- 대    상 : 마을만들기 관심 주민, 자생단체회원, 자원봉사활동자 등

- 교육과정 : 이론 강의, 현장 학습, 마을자원 찾기 및 계획수립 등

○ 마을재생 전문가 포럼 운영

- 운 영 일 : ’14. 5. 22(목), 5. 29(목), 6. 12(목) (총 3회)

- 대    상 : 코디네이터, 마을리더, 주민, 관계공무원 등

- 운영내용 : 마을만들기 사업발굴 제안 및 정책 자문 등

□ 금후계획

○ 하반기 마을리더 양성 아카데미 운영	’14. 9. 15 ～ 9. 30

○ 마을재생 전문가 포럼 운영	’14. 7월, 8월

지역공동체 활성화를 위한 마을재생 지원

○ 주민들이 소통하고 스스로 참여하는 지역공동체 복원 프로그램 운영

○ 주민참여 특화사업 추진으로 지역공동체 활성화 및 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 사업내용 : 마을재생학교 운영(11개 마을), 주민참여 특화사업(11개소),

마을명소화 및 지역공동체 활성화사업 발굴 추진

○ 사 업 비 : 188백만원(국비 70, 시비 118)

□ 추진상황

○ 주민 스스로 살기 좋은 마을을 만들어가는 마을재생학교 운영

- 기    간 : ’14. 6. 17 ～ 8. 22(2개월)

- 대    상 : 11개 마을

․완산구(6)개 마을 : 노송동, 완산동, 동서학동(2), 서서학동, 삼천3동

․덕진구(5)개 마을 : 인후1동, 덕진동, 금암2동, 팔복동, 호성동

- 운영과정 : 이론학습, 마을현황조사, 선진지 견학, 마을의제계획 수립 등

- 사 업 비 : 31백만원(마을별 280만원)

○ ’07 ～ ’10까지 조성된 마을가꾸기 사업장 사후관리

- 기    간 : ’14. 5 ～ 6월

- 대    상 : 93개소(완산 49, 덕진 44)

- 사 업 비 : 20백만원(동별 600천원 지원)

- 사업내용 : 마을가꾸기 사업현장 사후관리, 재료비 지원 등

□ 금후계획

○ 주민이 주도하고 참여하는 마을특화사업 추진

- 선정대상 : 11개 마을(’14년 마을재생학교 운영 동)

- 사 업 비 : 140백만원

- 사업선정 : 마을별 사업공모 적정성 검토 후 선정․지원

노후주거지 해피하우스 운영 지원

노후주거지의 점진적 재생에 해피하우스 사업을 도입하여 주민의 생활여건을

개선하고 삶의 질 향상으로 단독주택지역 재생 모델 창출

□ 사업개요

○ 운영구역 : 3개센터(인후센터, 노송센터, 완산센터)

○ 지원내용 : 주택유지관리, 에너지효율개선, 주거복지 서비스

○ 지원대상 : 수급자, 차상위, 전국가구 평균소득 이하 일반가구

○ 사 업 비 : 581백만원

□ 추진상황

○ 주택보수․점검 서비스 : 916세대, 6,294건(’14.6.30 현재)

계		전 기					건 축 / 설 비						기 타
세대	건수	콘센트 스위치	차단기	고효율 PL등	간선누전점검	인터폰	대문 문․ 창	욕실․ 변기	보일러 점검,보수	주방 부속류	환기 설비등	건축잔손보기	설치 지원상담	방역
916	6,294	1,455	236	675	335	81	1,194	646	127	128	75	336	601	405

○ 주민편익을 위한 소규모 마을개선 희망사업 : 주민쉼터조성 1개소

○ 주민참여 골목길 담장도색 : 12개소 2,700m 완료, 179세대 122명 참여

※ 자원봉사단 담장도색 및 벽화지원 : 2개소 660m, 55명 참여

□ 금후계획

○ 주택 보수․점검 서비스 추진(3개센터)	연중

- 차단기, 양변기부속품, 씽크대 수전 등 29개 항목 수리 서비스

○ 무료 건축설계 및 건축전반 상담(격월)	’14.  7 ～ 11월

- 센터별 사업지역내 단독주택 신․증축 관련 건축사 방문 상담

○ 주택 리폼 교육 실시	’14.  7 ～ 11월

- 전주시 전체를 대상으로 희망동 접수 및 교육

○ 하반기 마을개선희망사업 추진	’14.  7 ～ 11월

- 주민쉼터 1개소, 경관조명 1개소 등

○ 하반기 주민참여 골목길 담장도색 추진	’14.  7 ～ 11월

○ 해피하우스사업 서비스 주민 만족도 조사	’14. 12월

- 서비스 수혜세대(300세대 정도) 설문조사 및 모니터링 실시

신도시사업과  소 관

Ⅰ.	혁신도시 조성사업	----	16
Ⅱ.	만성지구 도시개발사업	----	17
Ⅲ.	효천지구 도시개발사업	----	18
Ⅳ.	서부신시가지 근린광장 및 주차장 조성	----	19
Ⅴ.	서부신시가지 저류지 시설개선	----	20
Ⅵ.	전주교도소 이전사업	----	21
Ⅶ.	에코시티 조성사업	----	22
Ⅷ.	항공대대 이전사업	----	23
Ⅸ.	전주대대(예비군대대) 이전사업	----	24

혁신도시 조성사업

○ 공공기관 지방이전을 통한 지방재정 확충 및 지방 균형발전 촉진

○ 지역전략산업과 연계한 지역발전 성장거점 육성

□ 사업개요

○ 위    치 : 장동․만성동․중동, 완주군 이서면 일원

○ 규    모 : 9,909천㎡(전주 3,740, 완주 6,169), 계획인구 28,837명

○ 사업기간 : 2007 ～ 2014년

○ 사 업 비 : 15,229억원

○ 사업시행자 : 한국토지주택공사(69%), 전북개발공사(31%)

※ 이전기관 : 12개 기관(전주 5, 완주 7)

□ 추진상황

○ 개발예정지구 지정 및 지구지정변경·개발계획 승인	’07. 4 ∼ 9월

○ 부지조성공사 착공	’08. 3월

○ 이전기관 입주	’13.  8 ∼ ’14. 6월

- 지방행정연수원(’13.8), 대한지적공사(’13.11), 한국전기안전공사(’14.6)

○ 공동주택 입주(5개 단지 2,922세대)	’13. 12 ∼ ’14. 2월

○ 부지조성공사 완료(1단계)	’13. 12. 31

□ 금후계획

○ 이전기관 입주	’14. 7월 ∼ ’16년

- ’14. 7 ∼ 12월 : 3개(농촌진흥청, 국립농업과학원, 한국농수산대학)

- ’15년 : 5개(국민연금공단, 국립원예특작과학원, 국립식량과학원,

국립축산과학원, 한국출판문화산업진흥원)

- ’16년 : 1개(한국식품연구원) ※ 현부지(성남시 소재)매각지연으로 사업비 미확보

○ 공동주택 입주(10개 단지 5,820세대, ‘14년 4개단지 2,400세대)	’14. 7월 ∼ ’16년

○ 개발계획 및 실시계획 변경 승인(국토교통부)	’14. 11월

○ 공사 준공(수질복원센터 등)	’14. 12월

만성지구 도시개발사업

○ 북부권 계획적인 정비와 법조단지 개발로 토지이용의 합리화

○ 전북혁신도시와 연결하여 균형 있는 도시개발로 광역도시 기틀 마련

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 만성동 400번지 일원

○ 규    모 : 1,434천㎡(계획인구 16,749명)

○ 사 업 비 : 4,757억원

○ 사업기간 : 2008. 12 ～ 2016. 12월

○ 사업시행자 : 한국토지주택공사, 전북개발공사

○ 시행방식 : 도시개발법에 의한 수용 및 사용방식

□ 추진상황

○ 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립 고시(전주시)	’08. 12월

○ 개발계획변경 및 실시계획인가	’09. 12월

○ 공동 사업시행 합의 및 협약	’13.  3월

※ LH : 583천㎡(41%), 전북개발공사 : 850천㎡(59%)

○ 개발계획 및 실시계획 변경 인가	’13.  6월

○ 공사착공	’13. 11월

- 토지보상 95%,  공사추진 공정율 5%

○ 대로 1-16호선 상수도 관로매설 완료(혁신도시 용수공급)	’14.  4월

□ 금후계획

○ 용지보상 완료(수용재결 및 공탁)	’14.  9월

○ 공동주택 토지 분양	’14. 하반기

○ 법원·검찰청 토지 인도 예정	’15. 11월

○ 공사 준공	’16. 12월

효천지구 도시개발사업

○ 전주시 남서부지역 주택 수요에 능동적으로 대처

○ 계획적인 도시개발을 통한 지역 균형개발 촉진

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 완산구 효자동2가 235-1(완산수영장) 일원

○ 규    모 : 673천㎡(계획인구 14,352명)

○ 사 업 비 : 1,320억원

○ 사업기간 : 2005. 12 ～ 2017. 12월

○ 사업시행자 : 한국토지주택공사

○ 시행방식 : 환지방식

□ 추진상황

○ 도시개발구역 지정(건교부)	’05. 12월

○ 개발계획수립 고시(건교부)	’07. 12월

○ 환지방식 및 환지 사업시행자 지정 동의서 접수	’10.  8월

○ 구역, 개발계획(변경) 및 실시계획인가(국토부)	’12. 12월

○ 기본설계 완료 및 실시설계 착수	’13. 12월

○ 지장물 보상계획 및 열람 공모, 환지계획 공람 공고	’14. 3 ～ 6월

□ 금후계획

○ 지장물 보상 착수	’14.  7월

○ 환지계획수립 인가(전주시)	’14.  9월

○ 실시설계 완료	’14. 10월

○ 공사 착공 및 준공	’14. 11. ～ ’17. 12월

서부신시가지 근린광장 및 주차장 조성

○ 근린광장( 2개소 ) 조성하여 쾌적한 환경조성

○ 지하 및 건물식 주차장을 건립하여 심각한 주차난 해소

□ 사업개요

○ 현    황 : 근린광장 2개소(지하주차장 중복결정), 노상 주차장 19개소

○ 규    모

- 근린광장 2개소 5,096㎡(중심상업용지내)

▪지하 주차장 : 2개소 지하1층(160면) 또는 지하2층(320면) 조성

- 건물식 주차장 : 5개소 738면(3층 4면) - 노상주차장 19개소중 선정

○ 사 업 비 : 255억원(광장 38,  지하주차장 62,  건물식 주차장 155)

○ 사업기간 : 2013. 12 ∼ 2015. 12월

□ 추진상황

○ 지구단위계획 변경	’12. 4. 20

- 근린광장 부지 2개소(5,096㎡) : 근린광장 및 지하주차장 복합용도 결정

○ 투융자심사 및 용역과제 심의	’12. 11월

○ 지방재정투융자 재심사(자체)	’13. 11월

○ 광장·주차장 타당성조사 및 기본계획용역 착수	’13. 12월

○ 용역 착수 보고 및 경관위원회 자문	’14.  4월

□ 금후계획

○ 타당성조사 및 기본계획용역 완료	’14.  8월

○ 실시설계용역 추진	’14.  9 ∼ ’14. 11월

○ 공사 착공 및 준공	’14. 12 ∼ ’15. 12월

서부신시가지 저류지 시설개선

저류지내 해충 발생, 시설 활용도 미흡 등 민원에 따른 해결방안으로 저류지내

용수 순환 시스템 도입 및 친수공간 조성

□ 사업개요

○ 시 설 명 : 서부신시가지 저류지 (유수지)

○ 위    치 : 서부신시가지 문학대2공원내 (현대 I’Park아파트 앞)

○ 면    적 : 13,339.4㎡ (약 4,035평)

○ 기    능 : 강우시 홍수 대비 저류기능 및 평상시 편익시설 활용

※ 서부신시가지 재해영향평가상 홍수 저감대책으로 영구 저류지 설치

○ 사 업 비 : 1,055백만원(도시개발특별회계, 2014년 600백만원)

○ 사업기간 : 2013. 9 ∼ 2015. 7

□ 추진상황

○ 서부신시가지 공사완료	’08.  6월

- 저류지(13,339㎡), 편익시설(데크 및 가로등)

○ 용역과제 심의	’13.  6월

○ 타당성 및 기본계획용역 완료	’13. 12월

○ 실시설계 용역 착수	’14.  2월

○ 공공디자인 자문 협의	’14.  5월

○ 실시설계 용역 완료	’14.  6월

□ 금후계획

○ 공사 계약	’14.  8월

○ 공사 착공 및 준공	’14. 9월 ∼ ’15.  7월

전주교도소 이전사업

○ 교도소 인근지역 시가화에 따른 주거환경 저해로 이전 필요

○ 재소자 사생활 침해 논란 및 서남권 도시개발 장애요인

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 일원

○ 규    모 : 198,348㎡ 정도

○ 사 업 비 : 1,500억원 정도

○ 사업기간 : 2012 ～ 2019

□ 추진상황

○ 전주교도소 이전 건의(시→법무부)	’02.  7월

○ 교도소 이전 신축 후보지 6개소 추천(시→법무부)	’10.  6월

○ 상림동지역 후보지선정 철회요구 집단민원 제기	’10.  8월

○ 교도소 이전 후보지 재추천 지시(법무부→전주시)	’10.  9월

○ 교도소 이전 타당성조사 용역 협의	’11.  8 ～ ’12. 10월

○ 기본조사 및 타당성조사 용역 추진	’12. 10 ∼ ’14.  2월

○ 인센티브 및 공모(안) 법무부 협의	’13.  7 ∼ ’14.  3월

○ 교도소이전 후보지 공개 모집(3개월)	’14.  4월

□ 금후계획

○ 이전후보지 공모 인센티브 협의 및 검토	’14.  7월

○ 이전후보지 공모	’14.  8월

○ 교도소 유치신청지역 평가 및 후보지 추천(시→법무부)	’14. 12월

○ 후보지 현지실사 및 이전지역 최종 선정(법무부)	’15.  2월

○ 기본조사설계 용역추진 및 행정절차 이행(법무부)	’15. ∼ ’16년

○ 교도소 신축공사 착공 및 준공(법무부)	’17. ∼ ’19년

에코시티 조성사업

지역 균형발전 및 광역도시기반 구축을 위하여 도심지에 존재하는 군부대를

이전하고 북부권개발을 선도할 친환경 생태도시 에코시티 조성

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 호성․송천․전미동 일원

○ 면    적 : 1.99㎢(35사단 1.11, 항공대 0.28, 사유지 0.6)

○ 사업기간 : 2006년 ∼ 2016년

○ 사 업 비 : 1,897억원(계획인구 33,000명)

○ 도시기본계획 : 자연녹지(시가화 예정용지)

○ 사업방식 : 혼용방식(수용‧사용방식+환지방식)

○ 추진방식 : 기부 대 양여방식

○ 사업시행자 : 전주시장(민간사업자:㈜에코시티)

□ 추진상황

○ 민간사업자 협약체결(전주시↔에코시티)	’06.  3월

○ 구역지정 및 개발계획(안) 관련기관 부서협의	’11.  4월

○ 도시개발구역지정 관련기관 협의(국토부, 국방부)	’12.  5월

○ 도시개발구역지정(개발계획 포함) 관련 시 도시계획위원회 심의	’12.  6월

○ 도시개발구역지정(개발계획 포함) 승인․고시	’12.  8월

○ 도시개발구역 보상절차 이행(보상계획공고 등)	’12.  9월

○ 토지 및 지장물 보상 감정평가 착수	’12. 10월

○ 보상시행(토지 및 지장물 보상 96%)	’13.  3월

○ 환지계획 조례 제정(공포)	’13. 12월

○ 개발계획(변경) 및 실시계획수립 고시	’14.  2월

○ 토지 수용재결 심의(3차 지토위)	’14.  5월

□ 금후계획

○ 실시설계(설계경제성 검토 포함)	’14.  7월

○ 기존 건축물 철거 및 폐기물 처리 착수	’14.  7월

○ 토지 수용재결 신청(4차 지토위)	’14.  9월

○ 환지계획 수립 및 환지 설계	’14. 10월

○ 토지매각 절차(계획수립, 승인, 매각공고, 입찰)추진	’14. 12 ∼ ’15. 12월

○ 토양오염정화사업 완료	’15.  3월

○ 공사 착공 및 준공	’14년 ∼ ’16년

항공대대 이전사업

항공대대를 이전함으로써 전주시의 장기적인 도시발전과 북부권 지역

주민들의 재산권 확보 및 기초생활권 보장 등 쾌적한 도시환경 조성

□ 사업개요

○ 이전위치 : 임실군 신평면 호암리(6탄약창내)

○ 기지종류 : 지원항공작전기지 ⇨ 헬기전용작전기지

○ 주요시설 : 항공대대 2개 부대(206:훈련 및 수송, 506:작전)

- 활주로 L=1.5㎞ ⇨ 활주로 L=0.49㎞(과주로 양쪽 255m씩 별도)

○ 사업기간 : 2012 ～ 2017년

○ 사 업 비 : 1,800억원(민자)

○ 사업시행자 : ㈜에코시티

□ 추진상황

○ 항공대대 이전 최적후보지 선정용역 시행(KIDA)	’11.  3월

○ 군사시설 이전건의 및 협의요청	’12.  5월

- ① 논산 육군항공학교 ② 군산비행장 ③ 임실6탄약창 또는 임실 35사단 이전부지 내

○ 항공대대 이전협의 및 사업방식 승인(국방부→전주시)	’12.  6월

- 이전지역 : 임실 제6탄약창,    - 사업방식 : 기부 대 양여사업

○ 항공대대 이전 합의각서(안) 제출(전주시→국방시설본부)	’13.  3월

○ 항공대대 이전 기부시설 협의(전주시↔사용부대)	’13. 4 ~ 6월

○ 임실 서면협의서 제출요구(국방부→전주시)	’13.  8월

○ 임실 서면협의 계획 통보	’13. 10월

○ 임실군에 이전 협의 요청	’13. 10월 ～ ’14.  4월

□ 금후계획

○ 사용부대 이전 협의(2작전사령부)	’14.  7월

○ 항공대대 이전 건의	’14.  8월

○ 합의각서(안) 제출 및 국방부 승인	’14. 10월

○ 사업계획 등 행정절차 이행(환경영향평가 등)	’15.  1월 ～ ’15.  8월

○ 공사 착공 및 준공	’15.  9월 ～ ’17. 12월

전주대대(예비군대대) 이전사업

북부권 지역의 쾌적한 도시환경 조성과 주․야간 사격소음 및 안전사고

예방을 위하여 전주대대 이전

□ 사업개요

○ 현 위 치 : 전주시 덕진구 송천동 2가 산 3번지 일원

○ 소    속 : 제35보병사단 106연대 2대대

○ 면    적 : 327,178㎡(9.8만평)[자연녹지 5.7만평, 덕진공원내 4.1만평]

○ 주요시설 : 예비군 훈련장 및 병영시설, 35사단 사격장

○ 용도지역 : 자연녹지지역, 최고고도지구(12층 이하),근린공원

○ 사업기간 : 2012 ～ 2017년

□ 추진상황

○ 전주대대이전 건의(전주시→국방부)	’12.  5월

○ 전주대대이전 이전협의 및 사업방식 통보	’12.  6월

- 이전지역 : 소양대대(106연대 4대대)

- 사업방식 : 206항공대대와 통합적 기부 對 양여방식

○ 전주대대 이전관련 건의(35사단→국방부)	’12.  8월

- (전주대대+완주대대)통합 → 현 106연대본부로 이전 건의

○ 전주대대 이전관련 의견제출(전주시→국방부)	’12.  9월

- 당초 승인대로(전주대대) → 완주대대로 이전 의견 제출

○ 전주대대 이견사항 조정 건의 및 안내	’12. 11월

- 전주대대 → 106연대 본부로 이전

○ 전주대대 이전 합의각서(안) 제출(전주시→국방시설본부)	’13.  3월

○ 전주대대 이전 기부시설 협의(전주시↔사용부대)	’13. 4 ~ 6월

○ 완주군에 이전 협의 요청	’13.  7월 ～ ’14.  5월

□ 금후계획

○ 사용부대 이전 협의(35사단)	’14.  7월

○ 전주대대 이전 건의	’14.  8월

○ 합의각서(안) 제출 및 국방부 승인	’14. 10월

○ 사업계획 등 행정절차 이행(환경영향평가 등)	’15.  1월 ～ ’15. 12월

○ 공사 착공 및 준공	’16.  1월 ～ ’17. 12월

스포츠타운조성과  소 관

Ⅰ.	동네 생활체육시설 조성	--	26
Ⅱ.	동남권 생활축구장 조성	--	27
Ⅲ.	유소년 축구장 조성	--	28
Ⅳ.	실내체육관 관람환경 개선	--	29
Ⅴ.	노후화된 공공체육시설 기능보강	--	30
Ⅵ.	국민체육센터 건립	--	31
Ⅶ.	시민이용 체육시설물 안전관리	--	32
Ⅷ.	종합경기장 이전 및 전시․컨벤션센터 건립	--	33

동네 생활체육시설 조성

시민 누구나 언제 어디서든지 쉽게 이용 가능한 생활밀착형 소규모      동네 체육시설 확충으로 생활체육을 통한 복지 실현

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 서곡로 양지뜸공원 등 5개소

○ 사업기간 : 2014. 3 ～ 12월

○ 사 업 비 : 1,220백만원(광특 366, 도비 122, 시비 732)

○ 사업내용 : 인라인 1, 족구장 2, 배드민턴장 1, 농구장 1, 배구장 1

- 양지뜸공원(인라인롤러장 탄성재 포장), 팔복공원(배구장 바닥포장)

강변공원(배드민턴장 바닥포장), 이바디공원(족구장 및 화장실 설치)

중상보공원(족구장, 농구장, 산책로 등)

□ 추진상황

○ 2014년 국고보조금(광특) 예산안 가내시 통보	’13. 11월

○ 현지 주민 의견수렴	’14.  2월

○ 공원조성계획 변경 및 실시설계 용역 착수	’14.  3월

※ 용역 진도율 : 80%(설계 내역서 작성중)

○ 하반기 사업대상지 조사	’14.  7월

□ 금후계획

○ 실시설계 완료(상반기 사업)	’14. 8월

○ 사업 시행(상반기 사업)	’14. 8 ～ 12월

○ 현지 주민 의견수렴 및 추가사업 시행(하반기 사업)	’14. 7 ～ 12월

동남권 생활축구장 조성

체육시설이 전무하여 주민들의 체육활동 여건이 열악한 전주 동남부      지역의 생활체육시설 확충을 통한 권역 배분 및 주민 여가생활 지원

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 색장동 426번지 외 12필지

○ 사업기간 : 2013. 3 ～ 2015. 12월

○ 사 업 비 : 4,139백만원(광특 582, 도비 194, 시비 3,363)

※ 확보예산 : 2,139백만원(광특 582, 도비 194, 시비 1,363)

○ 사업내용 : 부지면적 17,270㎡, 축구장 1면 및 편의시설 등

□ 추진상황

○ 부지선정 검토	’13.  3 ～ 5월

○ 지방재정 투·융자 심사 완료	’13.  6월

○ 2013년도 중기지방재정계획 심의	’13. 11월

○ 도시계획시설결정 및 전략환경영향평가 용역 착수	’14.  3월

- 용역 진도율 : 80%(초안 관련부서 협의)

○ 공유재산관리계획 의회 동의	’14.  6월

□ 금후계획

○ 지방재정 투·융자 재심사(전주시)	’14. 7월

○ 도시계획시설결정	’14. 8월

○ 실시설계 및 실시계획인가	’14. 8월

○ 부지매입 및 사업 시행	’14. 11 ～  ’15. 12월

유소년 축구장 조성

유소년 전용 인조잔디구장 조성으로 축구 꿈나무 교실 운영 등 유소년

축구선수 육성 및 축구대회 개최를 위한 축구 발전 인프라 제공

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 완산생활체육공원 내

○ 사업기간 : 2014. 3 ～ 12월

○ 사 업 비 : 3,700백만원(기금 2,000, 시 1,700)

※ 확보예산 : 2,000백만원(기금 2,000)

○ 사업내용 : 유소년 축구장 4면, 관리동 및 주차장 등

□ 추진상황

○ 유소년 축구전용구장 공모사업 선정(문체부)	’13. 12. 12

○ 유소년 축구전용구장 조성 체육진흥기금 교부신청	’13. 12. 13

○ 유소년 축구전용구장 조성 체육진흥기금 교부통지(20억)	’13. 12. 23

○ 공유재산관리계획 의회 동의	’14.  6. 20

□ 금후계획

○ 사업계획 변경 승인 요청(문체부)	’14.  7월

○ 투․융자 심사 등 절차이행	’14.  8월

○ 기본계획 및 실시설계	’14.  8 ～ 10월

○ 사업 시행	’14. 10 ～ 12월

실내체육관 관람환경 개선

한국프로농구 최고의 명문구단인 전주 KCC 홈구장으로 연간 십만명

이상의 농구팬이 꾸준히 찾고 있는 실내체육관의 경기 관람 환경개선

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 권삼득로 308 (실내체육관)

○ 사업기간 : 2014. 4 ～ 8월

○ 사 업 비 : 403백만원(기금 121, 시 282)

○ 사업내용

- 건축 : 화장실 증설 및 리모델링, 난방팬 설치, 수납식 관람석 보수

- 전기 : 관람석 조도개선 및 화장실 전기공사

□ 추진상황

○ 공공체육시설 개․보수 지원사업 공모사업 선정	’13. 12. 12

- 기금 163백만원 지원

○ 기본계획 및 실시설계 용역(17백만원)	’14.  1. 15 ～ 3. 14

○ 일상감사(시) 및 원가심사(도) 완료	’14.  4.  2

○ 공사착공(공정율 90%)	’14.  4. 28 ～

- 수납식 관람석 제작 설치 및 환기시설 설치중

□ 금후계획

○ 공사완료	’14. 8월

노후화된 공공체육시설 기능보강

노후화된 공공체육시설 리모델링 시행으로 시민의 건강증진과 여가생활을

지원하는 쾌적한 체육활동 공간 제공 및 사용자 만족도 제고

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 인라인롤러경기장 등 3개소

○ 사업기간 : 2013. 12 ～ 2014. 12월

○ 사 업 비 : 1,900백만원(광특 300, 특교세 500, 시비 1,100)

○ 사업내용

인라인롤러경기장 리모델링(800백만원)

- 트랙주로 변경보수(8→6m), 트랙바닥 마감재 재포설 등

유소년 테니스장 편의시설확충 공사(300백만원)

- 실내 운동공간 및 화장실 등 120㎡ 증축

월드컵경기장 환경개선사업(800백만원)

- 외부계단(남, 북쪽) 환경개선사업 1,800㎡ : 500백만원

- 익스펜션 조인트 3개소(경기장 동측 3층 1개소, 교량 2개소) : 300백만원

□ 추진상황

○ ’14년 광특회계 지역개발(체육진흥시설)사업 제출	’13.  5. 21

○ ’14년 공공체육시설 확충사업 국고보조금 가내시 통보(3억)	’13. 10. 17

○ 인라인롤러경기장 리모델링 설계용역 완료(24백만원)	’14.  4. 18

○ 유소년 테니스장 편의시설 확충 설계용역 완료(16백만원)	’14.  5. 22

○ 월드컵경기장 환경개선 사업 설계용역 완료	’14.  6. 30

□ 금후계획

○ 인라인롤러장 및 유소년테니스장 공사 착수	’14.  7월

○ 월드컵경기장 환경개선 공사 착수	’14.  8월

○ 인라인롤러경기장 등 3개소 공사 완료	’14. 12월

국민체육센터 건립

실내 체육활동 등 시민들의 다양한 욕구를 충족시킬 수 있는 다목적

국민체육센터를 건립하여 생활스포츠 활성화를 통한 삶의 질 향상 도모

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 평화동 일원

○ 사업기간 : 2014. 2 ～ 2016. 12월

○ 사 업 비 : 18,000백만원(국민체육진흥기금 3,000, 특교세 5,000, 도비 2,000, 시비 8,000)

※ 확보예산 : 3,000백만원(기금)

○ 사업내용 : 수영장, 헬스장, 다목적 체육관 등

□ 추진상황

○ 중기지방재정계획 반영	’13. 11월

○ 국민체육센터 건립 사업비 일부 확보(3,017백만원)	’13. 11월

- 기금 3,000백만원, 시비 17백만원

○ 국민체육센터 건립 타당성 조사 연구용역 착수(공정율 95%)	’14.  2월

- 부지선정, 사업규모, 기본구상안, 경제성 검토 등

○ 중앙 지방재정 투·융자 심사 의뢰	’14.  5월

□ 금후계획

○ 타당성 조사 연구용역 완료	’14.  7월

○ 공유재산관리계획 의회 동의	’14.  7월

○ 중앙 지방재정 투·융자 심사 완료	’14.  8월

○ 도시계획시설결정 및 설계용역	’14.  9월

○ 사업시행	’15년 ～ ’16년

시민이용 체육시설물 안전관리

공공체육시설의 구조적인 안전과 이용자들의 사고 예방을 위하여 관련법에

근거한 정기적 정밀점검 실시로 안전한 체육활동 확산

□ 사업개요

○ 사업위치 : 완산구 백제대로 310 화산체육관 등 3개소

○ 사업기간 : 2014. 6 ～ 12월

○ 사 업 비 : 45백만원

○ 사업내용 : 시설물에 대한 정밀점검 용역실시

○ 사업규모

시설명	연면적(㎡)	구조형식	용 도	준공일	점검년도	등급
화산체육관 (종합관)	15,008	철골철근콘크리트	문화 및 집회시설	1996.12	2011. 09 정밀점검	B
화산체육관 (빙상장)	10,782	철골철근콘크리트	문화 및 집회시설	1996.12	2011. 09 정밀점검	B
실내체육관	6,861	철골철근콘크리트	문화 및 집회시설	1973.09	2011. 09 정밀점검	C

□ 추진상황

○ 실내체육관 정밀점검 용역 시행(공정율 70%)	’14. 5. 22 ～ 8. 19

- 구조물 외관 시험 조사 및 시험결과에 따른 상태 평가중

○ 용역 내역서 및 과업지시서 작성(화산체육관)	’14. 7 ～  8월

※ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 : 2종 시설물(5천㎡이상 건축물), 3년이내 1회 이상 시행

□ 금후계획

○ 정밀점검 용역 시행	’14. 9 ～ 12월

- 화산체육관(종합관, 빙상장)

종합경기장 이전 및 전시ㆍ컨벤션센터 건립

○ 현 종합경기장을 이전 건립하고 종합경기장 부지를 컨벤션 등 복합단지로

개발하여 구도심 활성화 및 스포츠시설 집적화로 도시공간구조 개편

○ MICE산업을 통한 고부가가치 지역관광의 기반을 마련하고 중추도시권 육성을

위한 기반 확충

□ 사업개요

○ 전주종합경기장 이전(기부 대 양여)

․사업규모 : 1종 육상경기장(1만석 규모), 야구장(1만2천석 규모)

․사 업 비 : 1,100억원 정도     ․사 업 자 : 롯데쇼핑(주)

○ 호텔 건립(조건부 민간투자)

․사업규모 : 200실              ․사 업 비 : 300억원 정도

․사 업 자 : 롯데쇼핑(주)         ※ 운영자 : 롯데호텔

○ 전시‧컨벤션 건립(재정사업)

․사업규모 : 전시장 5,000㎡, 대회의실(2천명 이상) 1실, 중․소회의실(30명 이상) 10실

․사 업 비 : 590억원(국비 50%, 시비 50%)

□ 추진상황

○ 도유재산 무상 양여계약 체결	’05. 12월

○ 컨벤션 건립 위한 민자유치 방식의 경기장 이전사업 의회동의(2회)	’10.4월, ’11.12월

○ 민간사업자 선정(롯데쇼핑)	’12.  6월

○ 종합경기장 이전사업 지방재정 투‧융자심사(안전행정부)	’12.  7월

○ 전시산업발전심의위원회 심의 완료(산업통상자원부)	’12.  8월

○ 컨벤션 건립사업 지방재정 투․융자 심사(안전행정부)	’12. 10월

○ 민간사업자 협약체결(의회동의 조건부)	’12. 12월

○ 지역상권 영향분석 연구 용역 완료	’14.  7월

□ 금후계획

○ 각종 행정절차 이행	’14 ～ ’15년

○ 사업 시행	’15 ～ ’18년