제315회 전주시의회 제2차 정례회

2014년도 행정사무감사 / 도시건설위원회

2014년도

주요업무 추진상황 보고

시 민 교 통 본 부

보  고  순  서

□	일 반 현 황		-------	1
□	부 서 별 주 요 기 능		-------	2
□	기 본 현 황		-------	3
□	주요업무 추진계획		-------	5
	○	대 중 교 통 과	-------	5
	○	생 태 교 통 과	-------	13
	○	도 로 과	-------	22

일  반  현  황

□ 기  구 : 3과 11담당

								시민교통본부
대중교통과 (4 담 당)									생태교통과 (4 담 당)													도 로 과 (3 담 당)
대중교통									생태교통													자전거정책
시내버스									주차지도													도로시설
택 시									교통시설													도로정비
화 물									교통정보

□ 정 ‧ 현원

과 별		총 계	일 반 직						임기제
			4급	5급	6급	7급	8급	9급
계	정 원	53	1	3	12	18	14	5
	현 원	53	1	3	14	28	5	1	1
대중교통과	정 원	19	1	1	5	7	3	2
	현 원	19	1	1	5	10	1		1
생태교통과	정 원	19		1	4	6	5	3
	현 원	19		1	5	10	2	1
도 로 과	정 원	15		1	3	5	6
	현 원	15		1	4	8	2

부서별 주요기능

과 별	분 장 사 무
대 중 교 통 과	○ 대중교통 종합계획 수립 ○ 대중교통(버스, 택시, 화물) 업무추진 ○ 자동차운송사업체(버스, 택시, 화물 등) 지도감독 ○ 장애인 콜택시 업무
생 태 교 통 과	○ 교통종합계획 수립, 공영주차장 확충 및 관리 ○ 어린이보호구역 개선사업, 교통영향평가업무 ○ 교통안전시설, 교통신호시설 등 설치 및 유지관리 ○ 지능형 교통체계(ITS) 설치 및 운영관리
도 로 과	○ 자전거이용 활성화, 국․공유재산(도로)관리 및 용도폐지 ○ 신규 도로개설 및 용지보상, 도시가로망 확충사업 ○ 도로유지관리, 도로안내표지판 설치관리 ○ 도로포장 보수지도, 가로등 관리

기  본  현  황

□ 운수업체

○ 버  스

(단위 : 대)

구분	총계	시 내 버 스						관광(전세)	비고
		소계	신성	전일	제일	호남	시민
대수	844	382	95	91	90	74	32	소계 462 ▪ 20개사 : 451 ▪ 영업소 : 4개사/11

○ 택  시

(단위 : 대)

구 분	계	개인택시	회사택시	비 고
대 수	3,907	2,343	22개사/1,564대

○ 화  물

(단위 : 대)

구 분	계	개별사업자			일반사업자(5톤 이상)			비고
		소계	용달	개별	소계	법인	개인
대 수	3,885	1,859	1,062	797	2,026	1,898 (94개회사)	128

□ 주 차 장

구 분	계	노 상	노 외				부 설
			소계	공 영	공한지	민 영
개소 /면수	16,402 /297,245	91 /4,239	434 /18,451	68 /4,189	49 /560	317 /13,702	15,877 /274,555

□ 교통시설

(단위 : 개소, 개)

교차로	LED 신호등 (개소)	교통신호제어기	시각장애인 음 향 신 호 기	숫자형 잔여시간 표시기	교 통 표지판	차 선	횡단 보도	횡단보도 조명등
734 -신호:559 -경보:175	734	508	326	1,322	10,774	▪1,108개 노선 L=738㎞ ▪차선 L=2,604km	1,950 ▪신호 : 1,200 ▪비신호 : 750	206개소 544등

□ 지능형 교통시설

(단위 : 개소, 개)

버스도착 안내단말기 (BIT)	가변정보 전광판				교통흐름 관 찰 용 CCTV
	소계	동영상	문자식	도형식
273	14	1	10	3	43

□ 도    로

(단위 : 개소, ㎞)

구 분	계		고속국도		일반국도		지 방 도		시 도
	노선	연장	노선	연장	노선	연장	노선	연장	노선	연장
총연장	1,916	593	2	13	5	47	3	22	1,906	511
포장도	1,916	593	2	13	5	47	3	22	1,906	511
포장율 (%)		100		100		100		100		100

※ 도로율 : 16.38%(도로면적/시가지면적)

□ 교량 및 기타시설물

(단위 : 개)

구분 계	교 량					육교	지하 보도	지하차도	터널	언더 패스	비고
	소계	고속 국도	일반 국도	지방도	시도
164	120		36	2	82	16	6	5	2	15

※ 장대교량 (삼례교 : 570m, 회포대교 : 707m)

대중교통과 소관

□	장애인 특별운송수단 운영	----	6
□	시내버스 경영진단 수립용역	----	7
□	교통약자를 위한 저상버스 도입 및 운영	----	8
□	삼천동 시내버스 공영회차지 조성	----	9
□	전주․완주 시내버스 요금단일화	----	10
□	화물자동차 공영차고지 조성	----	11
□	택시 카드수수료 지원 사업	----	12

장애인 특별운송수단 운영

○ 장애인․고령자․임산부 등 교통수단의 이용 및 보행에 어려움을 겪고 있는 교통약자에 대한 이동편의 제공 및 사회참여 기회 확대

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014. 1. ∼ 12.

○ 사 업 비 : 1,545백만원

○ 사업내용 : 37대(콜택시 34대, 버스 3대)

- 장애인 특별운송수단(휠체어 탑승설비를 갖춘 차량) 운영

◦ 차량확보 : 37대(콜택시 34, 버스 3)

◦ 추진기간 : 2010 ~ 2014(5개년)

◦『교통약자의 이동편의증진법』에 따른 전주시 법정대수 : 34대

※ 전주시 1,2급 장애인수 : 6,795명 (200명당 1대)

장애인 특별운송수단확보

□ 추진상황

○ 장애인 특별운송수단 추가확보(1대)	’14. 1.

○ 장애인 특별운송수단 운영	’14. 1.~

- 이용실적 : 콜택시 34대(41,608건/68,335명), 셔틀버스 3대(2,107건/109,592명)

※ (사)전북곰두리봉사대 위탁운영( ’12.2.1. ∼ ’15.1.31. 3년간)

○ 장애인 콜택시 지도 점검 및 운영체계 개선	’14. 3.∼10.

- 차량운행 상황, 차량관리, 운전자 근무현황 점검, 인터넷 예약시스템 등

- 이용율이 적은 심야, 주말 운행축소 ⇨ 축소차량 평일 배치(주간)

□ 금후계획

○ 위탁 관리 동의안 제출	’14.  11.

○ 운영상황 지도감독 및 불편사항 개선	수   시

시내버스 경영진단 수립용역

○ 재정지원의 합리적인 근거를 마련하고 투명성과 객관성을 확보하여 원활한 대중교통의 서비스를 제공하기 위함

□ 사업개요

○ 기    간 : 2014. 3. ∼ 2015. 2. (12개월)

○ 용 역 비 : 75백만원

○ 업 체 명 : 회계법인 지평

○ 용역내용

- 업체의 재무상태 및 경영성, 기타 재무정보의 적정성 검증

- 외부회계감사 실시로 적자규모 파악 및 재정지원 규모 산정

- 시내버스 표준운송원가 산정

□ 추진상황

○ 용역착수	’14. 3.~

○ 업체별 회계자료 수집 및 실지조사 추진	’14. 4.~

○ 외부회계감사 시행(시내버스 회사방문)	’14. 7.~

○ 용역중간 결과 5개사 경리담당 간담회	’14.10.~

○ 시내버스 경영진단 용역 중간보고서 제출	’14. 11.

□ 금후계획

○ 시내버스 재정심의원회 개최	’14. 11.

○ 시내버스 경영진단 용역완료	’15.  3.

교통약자를 위한 저상버스 도입 및 운영

○ 저상버스 차량구입비와 운영비를 지원하여 안정적인 저상버스 운영으로 교통약자에 대한 이동편의 제공 및 사회참여 기회 확대

□ 사업개요

○ 기    간 : 2014. 1. ~ 12.

○ 사 업 비 : 2,695백만원

- 저상버스 구입 : 2,315백만원(23대/101백만원 정도)

- 저상버스 운영 :   380백만원(79대/   5백만원 정도)

○ 사업내용 : 저상버스 23대 구입 및 저상버스 운영비 지급

◦ 추진기간 : 2008 ~ 2016년(9개년)

◦ 총사업비 : 15,129백만원(구입비 12,184백만원, 운영비 2,945백만원)

※ 저상버스 구입비( 101백만원/대) : 국50%, 도25%, 시25%

저상버스 운영비(연 5백만원/대) : 도30%, 시70%

◦ 도입계획 : 122대(보유차량의 30%, 교통약자의 이동편의 증진법)

◦ 저상버스 구입현황 : 56대(2008년~2013년)

저상버스 도입 및 운영개요

□ 추진상황

○ 2014년 저상버스 도입 (21대)	’14. 1.~10.

- 신성6, 전일4, 제일5, 호남4, 시민2

○ 저상버스 운영비 지원(77대, 대당 5백만원)

□ 금후계획

○ ’14년 하반기 저상버스 구입 (전일2대)	’14. 12.

※ 2015 ~ 2016년 43대 구입 예정

삼천동 시내버스 공영회차지 조성

○ 시내버스 공영회차지 조성으로 운전원들의 휴식을 통한 안전운행과

향후 효율적인 노선개편에 대비하기 위한 기반시설 마련

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2012. 11. ∼ 2014. 11.

○ 총사업비 : 1,511백만원(부지매입 674, 조성비 837)

○ 사업위치 : 완산구 정여립로 538(상림동 충전소 인근)

○ 사업규모 : 2,893㎡, 건축 연면적 99㎡(지상 1층)

- 주차면 15면, 식당, 휴게실, 화장실 등

□ 추진상황

○ 삼천동 가스충전소 인근 회차지 부지매입	’12. 12.

○ 공영회차지 조성공사 설계용역 완료	’13.  4.

○ 공영회차지 공용건축물 건축협의 완료	’13.  8.

○ 공사계약 및 착공	’13. 12.

○ 삼천동 시내버스 공영 회차지 조성공사 완료	’14.  9.

□ 금후계획

○ 가족랜드 종점 이전 및 기사 쉼터 활용	’14. 11

○ 정여립로 개통 후 노선개편에 따른 회차지 활용	’15.  6

전주․완주 시내버스 요금단일화

○ 전주․완주 시내버스 요금단일화를 통해 동일 생활권임을 인식하고 상호교류를 통해 지역발전에 기여할 수 있는 여건 조성

□ 사업개요

○ 위    치 : 완주군 전지역

○ 운행현황 : 121개 노선, 382대(완주군 경유 : 81개 노선 190대)

○ 시행시기 : 의회동의 이후

○ 추진방법 : 선시행 후 단일화손실보전용역에 따라 손실보전금 지급

○ 사업내용 : 전주시와 완주군 시내버스 기본요금(1,200원)으로 요금단일화

- 대중교통 서비스 질 향상을 위한 노선개편(지․간선제)과 연계 추진

□ 추진상황

○ 요금단일화 전면 시행 및 중단(완주군 전지역)	’13. 5. ~ 9.

○ 완주군 방문 실무협의(혁신도시요금단일화 의견합의)	’14.  3.

○ 전주시의회 간담회 추진(1차)	’14.  5.

- 완주군 전체지역(혁신도시 포함)에 대한 요금단일화 추진

○ 전주시의회 간담회(2차)	’14. 7.

- 요금단일화 취지는 설득력이 있으나 시민의 공감대 형성이 우선

- 시내버스 서비스 개선을 위한 노선 전면개편(지간선제 포함)과 함께 추진

○ 전주시의회 간담회(3차)	’14. 9.

○ 전주시의회 동의안 유보	’14.10.23

□ 금후계획

○ 시내버스 요금단일화 시행 : 의회 동의 후

※ 전주․완주 요금단일화 용역 추진(비용 공동 부담)

화물 공영차고지 조성 실시설계 용역

○ 물류거점 확보로 경쟁력을 강화하여 화물운송사업 발전을 도모하고 주택가 및 아파트 주변 도로의 밤샘주차 등을 근절하여 시민 불편을 해소하고자 함

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014. 2. ～ 12.

○ 사 업 비 : 200백만원

○ 사업내용 : 기본 및 실시설계

◦ 사업장소 : 장동유통단지 내 화물터미널부지(장동 1054-1)

◦ 사업규모 : 약 41,680㎡(주차면수 : 500면/관리동 및 편의시설 1,000㎡정도)

◦ 사업기간 : ’13년 ∼ ’17년(5년)

◦ 총사업비 : 약 120.9억원 (광특 84.6억 / 시비 36.3억)

※ 용역비 2억 / 토지매입비 77.5억 / 건축비 41.4억

조성계획

□ 추진상황

○ 중기 지방재정 계획반영	’13.  8.

○ 공영차고지 조성계획 수립	’13. 10.

○ 지방재정 투․융자 조건부 승인	’14.  7.

○ 화물공영차고지 용역과제 심의	’14. 11.

□ 금후계획

○ 기본□실시설계 용역 등 행정절차 추진	’14. 12월

○ 공영차고지 용지매입(77.5억원, 3개년 분할납부)	’15년∼’17년

○ 공영차고지 조성완료 및 운영	’17년 이후

택시 카드수수료 지원

○ 택시요금 카드결제에 따른 수수료 비용발생에 대해 운수종사자의

카드결제 회피를 방지하여 시민편의를 제공하고, 카드이용률 제고에 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2014. 1. ∼ 12.

○ 지원대상 : 3,829대(카드단말기 장착 차량)

○ 소요예산 : 469백만원

※ 택시요금 카드수수료 발생분(2.1%)에 한하여 매월 1만원/대당 한도 지급

○ 지급시기 : 매월 지급

□ 추진상황

○ 개인택시 카드단말기 설치(2,345대)	’11∼12년

- 한옥콜사업 1,000대, 카드단말기 설치지원 사업 741대, 자체설치 604대

○ 법인택시 카드단말기 설치(1,484대)	’13년

○ 택시 카드수수료 보조금 지급	’14.10.

- 지급실적 : ’14년 1∼10월분 2,577,508건 252백만원

□ 금후계획

○ 택시 카드 수수료 보조금 지급(매월)	’14. 11.~

○ 택시 카드결제 현장탑승 점검․지도	수  시

생태교통과  소관

□	공영주차장 조성	----	14
□	내 집 주차장 갖기 사업	----	15
□	스쿨존 어린이 안전지킴이 운영	----	16
□	교통약자를 위한 교통안전교육 위탁 관리	----	17
□	교통안전시설 확충으로 안전한 교통환경 조성	----	18
□	어린이보호구역 개선 및 정비사업	----	19
□	노인보호구역 개선 및 정비사업	----	20
□	승강장 버스도착안내단말기(BIT) 확충	----	21

공영주차장  조성

○ 주차 수급실태 조사결과 주차난이 심각한 지역에 공영주차장 조성 및

도심지 주택 밀집지역에 소규모 주차장을 조성하여 주민편익 도모

□ 현    황

○ 공영주차장 : 총 68개소  4,189면

- 유료  12개소 1,749면 / 무료  56개소 2,440면

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014. 1. ∼ 12.

○ 사 업 비 : 3,350백만원

○ 사업규모 : 9개소  300면정도

○ 사업내용 : 주차장 포장, 배수공사, 주민편익시설 등

※ 주차수급 실태조사 순위 및 한옥마을 인근지역 중 부지 확보 가능지역

□ 추진상황

○ 공영주차장 조성 : 5개소  178면

- 하가지구 주차장(4개소) 114면, 인후공원 주차장 64면

○ 주차장 조성 부지 매입(2개소)	2014. 9. ～ 10.

- 서신동 주차장 : 서신동 944-2번지(802㎡, 주차면수 28면 정도)

- 남노송동 주차장 : 남노송동 519-64(1,125㎡, 주차면수 47면 정도)

□ 금후계획

○ 인후2동, 동완산동 주차장 부지매입	2014.11.

○ 주차장 조성공사 완료	2015. 2.

내 집 주차장 갖기 사업

○ 부설주차장이 없는 단독주택에 주차장 조성시 지원하여 주차난 해소

○ 기존 주차시설 부족으로 주차난이 심각한 공동주택의 단지내 여유

공간을 활용하여 주차장 추가 확충

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014. 1. ∼ 12.

○ 사 업 비 : 100백만원

○ 사업대상

- 기존 부설주차장이 없는 단독주택

- ’94년 이전 사업계획 승인된 20세대 이상 공동주택내 여유공간을         행위허가 득하여 주차장으로 조성한 공동주택

○ 사업비 지원

- 단독주택 : 담장철거 150만원, 대문철거 170만원, 옆집 공동설치 200만원

- 공동주택 : 최소 5면 이상 20면까지, 1면당 50만원 최대 1,000만원 지원

□ 추진상황

○ 주차장 보조금 지원 : 총 16개소  97면  58백만원

- 단독주택 : 8개소   8면  14백만원

- 공동주택 : 8개소  89면  44백만원

□ 금후계획

○ 홍보실시	연중

○ 설치 가능한 주차시설 신청 및 접수	연중

○ 주차시설 설치 및 보조금 교부	연중

스쿨존 어린이 안전지킴이 운영

○ 스쿨존에 어린이 안전지킴이 봉사자 배치 운영으로 통학길에 발생

할 수 있는 교통사고 등 각종 위험으로부터 어린이를 보호하고, 교통

법규 준수 생활화를 위한 현장교육 및 학교주변 순찰 강화로 안전한

어린이 통학환경 조성

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014. 3. ∼ 12.(방학기간 제외)

○ 사 업 비 : 200백만원

○ 사업규모 : 50개교 / 100명 (학교별 2명)

○ 사업내용 : 초등학교 하교시간대 스쿨존 등 교통취약지역 교통지도 및

우범지역 순찰활동

○ 참여대상 : 녹색어머니회 등 교통관련 자원봉사단체 회원

□ 추진상황

○ 하굣길 어린이 안전지킴이 운영 : 50개교 100명

※ 워킹스쿨버스(Walking School Bus) 병행 추진 : 6개교 26명

○ 안전지킴이 봉사자 안전교육 실시 : 2회 200명(3월, 8월)

□ 금후계획

○ 각 학교별 안전지킴이 마무리 운영	2014. 12.

○ 스쿨존 안전지킴이 평가 및 우수봉사자 시상	2014. 12.

○ 2015년 안전지킴이 봉사자 모집 및 배치운영	2015. 2.~ 3.

교통약자를 위한 교통안전교육 위탁관리

○ 어린이, 노인 등 교통약자의 교통안전에 대한 중요성이 날로 증가하여

교통안전교육 위탁사업자를 선정, 전문적인 프로그램 운영을 통해

교육효과 증대 및 교통사고 줄이기에 기여

□ 사업개요

○ 위탁기간 : 2014. 4. ~ 2017. 3.(3년)

○ 위탁업체 : (사)전북안전교육협회

○ 사 업 비 : 80백만원

○ 위탁내용 : 교통공원 운영

- 교통약자(어린이, 노인) 대상 교통안전교육 : 10,000명 정도

□어린이 교통사고 예방을 위한 교통공원 체험교육

□노인회관, 경로당 등 찾아가는 교통안전교실 운영

- 하굣길 안전지킴이 교통안전교육 : 200명 정도

- 워킹스쿨버스 교통안전도우미 양성교육 : 50명 정도

□ 추진상황

○ 교통공원 활용 어린이 교통체험 학습관 운영 : 244회  9,680명

○ 찾아가는 어르신 교통안전교육 : 14회  325명

○ 하굣길 안전지킴이 교통안전교육 : 2회  200명

○ 워킹스쿨버스 교통안전도우미 양성교육 : 2회  52명

□ 금후계획

○ 교통약자 교통안전교육 지속적 운영	연중

교통안전시설 확충으로 안전한 교통환경 조성

○ 교통안전시설 확충 및 신속한 보수로 교통사고 예방

○ 연간 단가계약 시행으로 각종 민원 신속처리 시민편익증진

□ 현    황

시설명	신호등	차 선	교통표지판	시선유도시설	기타시설
수량	1,341	L=2,604km 횡단보도 1,950개소	10,774개	91,020개	반사경 1,847개 안전휀스 5,047m

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014. 1. ～ 2015. 2.

○ 사 업 비 : 4,800백만원

○ 사업내용                                        (단위:백만원)

사 업 명	사업비	사업내용
합 계	4,800
차선도색 및 지우기	3,300	□차선도색 L=500km, 서부신시가지 도시개발지구 □횡단보도 도색 500개소
교통안전시설 설치 및 보수	300	□표지판 정비 700개소 □반사경 정비 150개 □시선유도봉정비 1,000개 □무단횡단방지시설 600m
교통신호등 신설 및 개선	1,000	□와이어 없는 신호등 가로재 정비 50개 교차로
횡단보도 조명등 설치 및 보수	200	□횡단보도 조명등 신설 및 개선 80개소

□ 추진상황

○ 공사계약 및 착공	2014.  2.

○ 공정율(10월말 기준) : 85%

- 차선도색 : 서부신시가지 및 간선도로 L=350km, 횡단보도 300개소

- 교통시설 : 표지판, 반사경 정비·신설 500개소, 시선유도봉 정비 1,000개,

무단횡단방지시설 설치 600m

- 신호등 : 덕적천 외 3개소 신설 및 2개 교차로 가로재정비 82등 신설 및 388등 보수

- 횡단보도 조명등 : 기린대로 18개소 32등 개선

□ 금후계획

○ 공사준공(단가계약)	2015.  2.

어린이보호구역 개선 및 정비사업

○ 어린이보호구역내 스피드 디스플레이 등 교통안전시설 확충 및      기 개선이 완료된 시설 중 노후 및 파손 시설에 대한 지속적 유지     관리로 안전한 어린이 통학환경 제공

※ 지정근거 : 어린이·노인·장애인 보호구역의 지정 및 관리에 관한 규칙

□ 현    황

구 분	합 계	초등학교	특수학교	유치원	어린이집	비 고
대 상	209	67	5	78	59	※ 어린이집은 100인 이상 어린이보호구역지정 대상, 단, 100인 미만은 경찰서 협의 시 지정 가능
지 정	176	67	5	60	44
미지정	33	-	-	18	15
※ 어린이보호 말하는 CCTV 구축 - 초등학교 67개교 중 56개교 완료, 미설치 11개교(2014 설치완료 : 안전총괄과)

※ 어린이보호구역 개선 : 176개교 (2003∼2013년)

어린이보호 말하는CCTV : 56개교 382대 (2009∼2013년)

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014. 1. ∼ 2015. 2

○ 사 업 비 : 240백만원(시설개선 140 / 스피드디스플레이 100)

○ 사업대상 : 어린이보호구역 176개소

○ 사업내용 : 스피드디스플레이(10개소), 미끄럼방지포장 1식, 교통표지판 1식,                  안전휀스 설치 1식, 차선도색 및 노면표지 1식 등

□ 추진상황

○ 공사계약 및 착공	2014. 3.

○ 공정율(10월말 기준) : 80%

- 스피드디스플레이 설치 10개소

- 어린이보호구역 미작동 전광표지판 30개소 보수 외 21건

- 효림초교 횡단보도 설치 1개소 외 44건 등

□ 금후계획

○ 공사준공	2015. 2.

노인보호구역 개선 및 정비사업

○ 교통 약자인 어르신을 교통 안전사고로부터 보호하기 위하여

실질적인 안전대책 강구

○ 노인보호구역 주변 무단횡단 다발지역에 대한 시설 보완 필요

※ 지정근거 : 어린이·노인·장애인 보호구역의 지정 및 관리에 관한 규칙

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014. 1. ∼ 2015. 2.

○ 사 업 비 : 100백만원

○ 사업대상 : 전주시 관내 9개소

- 덕진, 양지, 서원, 안골, 금암, 꽃밭정이, 전북노인복지관,

전주시노인취업지원센터, 산성경로문화관

○ 사업내용 : 무단횡단 방지시설, 안전휀스, 미끄럼방지포장, 노면표시 등

65세 이상 교통사고 현황 – 전주시 전역

년도별	계	2013	2012	2011	2010	2009	비고
사망자수(명)	111	22	22	12	32	23

※ 주요 사고유형 : 무단횡단 사망사고(차 : 사람)

□ 추진상황

○ 공사 계약 및 착공	2014. 4.

○ 공정율(10월말 기준) : 85%

- 차선도색 및 노면표지 9개소, 노인보호구역 통합표지판 4개소

시인성포장 3개소, 횡단보도 설치 1개소, 교통표지판 9개소 등

□ 금후계획

○ 공사준공	2015. 2.

승강장 버스도착안내단말기(BIT) 확충

○ 승강장에서 실시간 버스운행정보 및 노선 등 다양한 버스 정보를 검색할      수 있는 버스도착안내단말기에 대한 시민 만족도가 매우 높아 미설치     승강장에 지속적인 확대 설치로 대중교통이용 서비스 향상

□ 설치현황

전체 승강장 수	설치 대상 (유개승강장)			비 고
	계	설치완료	미설치
999	574	273	301

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014. 1. ～ 2015. 2

○ 사 업 비 : 720백만원

○ 사업대상 : 관내 유개승강장 중 이용객이 많은 지역 우선

○ 사업내용 : 버스도착안내단말기(BIT) 55개소 설치

□ 추진상황

○ 설치 대상 승강장 선정	2014. 2.

○ 버스도착안내단말기 설치 완료(35대)	2014. 6.

□ 금후계획

○ 버스도착안내단말기 2차분 설치완료(20대)	2015. 2.

○ 기 설치 버스도착안내단말기 유지관리	연  중

○ 미설치 승강장은 버스 이용객 등을 고려하여 단계적 설치 추진

도 로 과  소 관

□	자전거이용 활성화 추진	----	23
□	정여립로(쑥고개로~콩쥐팥쥐로) 개설	----	24
□	효 자 로 확 장	----	25
□	쑥 고 개 길 확 장	----	26
□	전통문화도시 문화적 경관조성(전주천 동로)	----	27
□	동부대로(호성로) 보행환경 조성	----	28
□	혁신로(호남제일문~동산고가교) 확장	----	29
□	전 진 로 확 장	----	30
□	도로명 안내표지 설치	----	31
	교통사고 위험도로 구조개선	----	32
	북부권 국도대체우회도로 건설(용정～용진)	----	33
	북부권 국도대체우회도로 2단계 건설(용진~우아)	----	34
	새만금~전주~대구~포항간 고속도로 건설	----	35

자전거이용 활성화 추진

○ 무공해 이동수단으로 에너지 절약 실천․환경보전 및 교통난 해소

○ 전주를 자전거타기 좋은 녹색환경 교통도시로 조성

□ 현    황

○ 자전거 보유대수 : 204,930대(성인용 188,540, 어린이용 16,390)

○ 자전거 보 유 율 : 32%

○ 자전거 도    로 : 77개 노선 / 366.9㎞

○ 자전거 보 관 대 : 346조 / 2,722대

□ 추진상황

○ 2014년 전주시민 자전거 대행진 행사 개최(5회)	2014. 3. ~ 10.

○ 서원로 노후 자전거도로 정비 완료(191백만원)	2014. 5. 16

- 중화산동 예수병원 앞~효자동 이동교 사거리(L=729m, B=2.5~3m)

○ 자전거 여행지도 제작․배부 완료(10,000부)	2014.  9. 11

○ 자전거 보관대 설치 및 정비공사 착공(50백만원)	2014.  9. 16

○ 자전거도로 안전표지 정비 완료(250백만원)	2014. 10. 24

○ 2014년 상․하반기 자전거 교통수단 분담률 조사	2014. 5월, 10월

□ 금후계획

○ 자전거 보관대 설치 및 정비 완료(50백만원)	2014. 12.

○ 시민 무료자전거교실 운영(매주 5회 실시)	2014. 3.~11.

○ 전주시공영자전거대여소 운영(개소식 : 2013.11.15)	연 중

- 2개소(전주자연생태박물관 앞, 덕진구 하천관리소 앞)

정여립로(쑥고개로∼콩쥐팥쥐로) 개설

○ 전주 서남부권역 및 전북혁신도시를 잇는 도로망으로, 향후 교통량의

폭발적 증가에 대비한 주요 교통망으로 조기개설 필요

○ 2009년 준공된 전주영상제작단지의 열악한 진입로 환경 개선으로

대형영화장비 진․출입 등의 문제 해결로 영화제작환경 개선

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2008 ～ 2020(13개년)

○ 총사업비 : 39,000백만원(보상 7,000, 공사 32,000)

○ 위    치 : 쑥고개로～자원순환단지～원상림마을～콩쥐팥쥐로

○ 사업규모 : 연장 4,152m, 폭 35m(소로 연장 402m 폭10m 포함)

구 분	1단계 - 1공구	1단계 - 2공구	2단계
사업기간	2013～2014(2개년)	2014～2015(2개년)	2016～2020(5개년)
사 업 비	9,200백만원	6,800백만원	23,000백만원 (보상 1,000 공사 22,000)
구 간	자원순환단지 ～ 원상림마을(영상제작단지)	원상림마을(영상제작단지) ～ 콩쥐팥쥐로	쑥고개로～자원순환단지～원상림마을～콩쥐팥쥐로
사업규모	연장 852m, 폭 10～15m	연장 1,300m, 폭 15m	연장 3,750m, 폭 15→35m

※ 소각폐열 산업단지 판매사업 관련 민간투자사업(자원위생과)추진 : 1단계 - 2공구

□ 추진상황

○ 1단계-1공구 사업 공사착공(공정율 83%)	2013. 4. 10

○ 1단계-2공구 사업 공사착공(공정율 10%)	2014. 7.

□ 금후계획

○ 1단계-1공구 공사완공	2015. 2.

○ 1단계-2공구 공사완공	2015. 4.

○ 2단계 사업 추진	2016.∼2020.

효  자  로   확  장

○ 혁신도시와 효자 4․5택지 서부신시가지간 도시가로망 확충

○ 급속한 택지 개발로 날로 증가하고 있는 교통량에 대한 탄력적 대응

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2012 ～ 2015(4개년)

○ 총사업비 : 10,183백만원(보상 5,000, 공사 5,000, 설계 183)

○ 위    치 : 효자동 그랜드자동차학원 ～ 천잠로

○ 사업규모 : 연장 750m, 폭 10 ⇨ 35m

□ 추진상황 (공정율 70%)

○ 투융자 심사 및 용역과제 심의 완료	2012. 6. 5

○ 실시설계 용역 완료	2013. 3. 4

○ 일상감사 및 계약심의 완료	2013. 6.13

○ 공사 착공	2013. 9.24

○ 미협의 토지 및 지장물 수용절차 완료	2013.11.15

○ 전주대방향 반폭(3차로) 중간층포장 완료	2014. 6.20

○ 선화학교 방향(6차로 L=400m) 중간층포장 완료	2014.11. 4

□ 금후계획

○ 차량통행(6차선)을 위한 중간층포장 완료	2014. 12.

○ 공사 완료	2015.  3.

쑥 고 개 길  확 장

○ 시내를 통과하는 국도1호선 확장으로 교통체증 해소

○ 효자 4,5택지 개발로 증가하는 교통량의 탄력적 대응 및 보행환경 개선

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2006 ～ 2015(10개년)

○ 총사업비 : 10,500백만원(보상 7,300, 공사 3,200)

- 기    투    자 : 9,600백만원(특교 500)

- 2014년 사업비 :  900백만원

○ 위    치 : 효자동 안행교사거리 ～ 효자광장

○ 사업규모 : 연장 620m, 폭 25 ⇨ 35m

□ 추진상황 (공정율 15%)

○ 실시설계 완료	2008. 2. 22

○ 편입토지 59필지중 49필지 보상완료(87.7%)	2013. 6. 30

○ 공사 착공	2013.10.  1

○ 미협의 토지(9필지) 및 영업보상 1건 수용절차 완료	2014. 1. 26

○ 공사중지	2014. 9. 24

□ 쟁점사항 및 대책

○ 우진․태하아파트 재건축 정비사업 접합구간 가감차선에 대하여

쑥고개길 확장공사와 병행시공 추진(인가 조건 사항 이행)

○ 도로경계 인접부 기존 건물 피해 예방을 위한 보호공법 검토

○ 금호청솔맨션 진입로 급경사 예방을 위한 종단경사 검토

□ 금후계획

○ 공사 완료	2015. 6.

전통문화도시 문화적 경관조성(전주천 동로)

○ 주변 자연경관을 활용하여 남부시장, 한옥마을 연계 슬로시티 환경 조성

○ 한옥마을과 전주천이 어우러지는 테마특화거리 조성

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2009 ～ 2014(6개년)

○ 총사업비 : 9,000백만원(보상 3,800, 공사 5,200)

- 기   투   자 : 8,700백만원

- 2014년 사업비 : 300백만원

○ 위    치 : 싸전다리 ～ 남천교 ∼ 한벽당간

○ 사업규모 : 연장 930m, 폭 6～8 ⇨ 12m

□ 추진상황 (공정율 75%)

○ 경관심의 및 교통안전심의회 심의	2012. 10. 16

○ 시설공사 원가심사 및 계약심의	2013.  7. 25

○ 공사 착공	2013.  9. 23

○ 토지 및 지장물 보상 완료 (27필지, 26건)	2014.  2.  9

○ 상․하수도, 한전․통신 지중화 관로 매설 완료	2014.  5. 16

○ 싸전다리 ∼ 남천교간 포장완료	2014.  7.  3

○ 남천교 ~ 향교구간 포장완료	2014. 11.  4

□ 금후계획

○ 공사 완료	2014. 12.

동부대로(호성로) 보행환경 조성

○ 급속한 주변개발로 보행자가 증가함에 따라 도로확장 및 인도 개설 필요

○ 도로확장 및 보행환경개선으로 교통사고 발생예방 및 주민불편사항 해소

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2009 ～ 2016(8개년)

○ 사 업 비 : 18,000백만원(보상 6,000 공사 12,000)

- 기 투 자 : 11,790백만원(’14년 400백만원)

- 이후계획 :  6,210백만원

○ 위    치 : 덕진구 송천동 전미로～호성동 차량등록사업소

○ 사업규모 : 연장 3,000m 폭 18.5 → 35m

□ 추진상황 (공정율 60%)

○ 전미로 ∼ 구)기린육교(연장 1,500m) 확장 완공	2011. 2. 5

○ 기린육교 ∼ 대송장례식장(연장 500m) 확장 완공	2013. 6.13

□ 쟁점사항 및 대책

○ 대송장례식장～차량등록사업소(연장:1,000m) 미확장 사업효과 반감

및 주민통행 불편

⇨ 부족사업비 조기에 확보하여 우선 한쪽면(시내쪽) 확장 추진

□ 금후계획

○ 시내쪽 편입토지 26필지 보상 및 공사 착수	2015. 3.

○ 반대편쪽 전체토지 16필지 보상 및 전체공사 완공	2016. 12.

혁신로(호남제일문∼동산고가교) 확장

○ 동산동, 조촌동 일대 유동인구 증가로 인한 보행권 확보가 필요

○ 차량의 급속한 증가로 인한 도로확장으로 교통체증 해소에 기여

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2008 ~ 2016(9개년)

○ 사 업 비 : 13,000백만원(보상 5,000 공사 8,000)

- 기    투   자 : 3,700백만원(보상비)

- 2014년 사업비 : 1,000백만원

- 이  후  계 획 :  8,300백만원

○ 위    치 : 덕진구 여의동 호남제일문～반월동 동산고가교

○ 사업규모 : 연장 1,000m 폭 18.5 → 35m

□ 추진상황

○ 실시설계용역 완료	2009.  7. 10

○ 전체 76필지 중 58필지 보상 완료	2014. 10.  2

- 토지수용신청 2필지	2014. 10. 15

□ 금후계획

○ 미협의 토지(16필지) 협의 추진	2014. 12.

○ 공사 착수	2015.  3.

○ 공사 완공	2016. 12.

전  진  로   확  장

○ 완주 ～ 순천간 고속도로 동전주IC 개통으로 시가지 진입 교통량 증가

○ 반폭개설된 도로를 확장하여 동부지역 관문의 교통체증 해소에 기여

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2013 ～ 2016(4개년)

○ 사 업 비 : 10,800백만원(보상 2,800, 공사 7,800, 설계 200)

- 기   투   자 :  1,000백만원

- 2014년 사업비 : 3,000백만원

- 이 후 계 획 :  6,800백만원

○ 위    치 : 산정동 백자삼거리 ～ 금상성당

○ 사업규모 : 도로개설 연장 860m, 폭 18 ⇨ 35m

□ 추진상황

○ 도시계획시설(도로)사업 실시계획인가	2014. 3. 28

○ 실시설계 용역 완료	2014. 4. 13

○ 편입 용지보상 착수	2014. 8.  4

- 편입토지 77필지 8,191㎡ ⇨ 협의 47필지 5,996㎡

□ 금후계획

○ 토지 수용 및 편입 용지 보상 완료	2015. 3.

○ 공사 착공	2015. 6.

○ 공사 완료	2016.12.

도로명 안내표지 설치

○ “지명․시설물명” ⇒ “도로명”으로 변경하는 선도사업으로 시행(국토교통부)

○ 안전행정부 새주소사업과 연계 도로명주소로 정착하는 시너지효과 거양

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2013. 1. ~ 2015. 12.(3개년)

○ 총사업비 : 50억원(국 35, 시 15)

- 2014년 사업비 : 11억원(국 5,  시 6)

- 이 후 계 획    :  4억원(국 4)

○ 위    치 : 전주시 관내

○ 사업규모 : 도로표지판 정비 1,129개소

(표지판 설치 650개소. 철거 479)

□ 추진상황(공정율 43%)

○ 도로명 안내표지 선도사업 선정	2012. 5. 7

○ 실시설계 용역 착수	2013. 3.22

○ 표지판설치자문위원회 설치·운영(’13. 8월~11월) : 4회

○ 국토교통부 협의	2013.10.21

○ 계약심의위원회(물품구매 표지판 650개소)	2013.10.31

○ 국토교통부 승인	2013. 11.

○ 공사 착공	2013.12.16

○ 동부대로등 표지판 설치(현재 280개소 설치)

□ 금후계획

○ 공사 완료	2015. 12.

교통사고 위험도로 구조개선

○ 불합리한 교통사고 위험도로 구조를 구간특성에 맞는 2+1차로로 확장

○ 도로의 선형개량으로 차량통행에 원활을 기하고 교통사고 예방효과 거양

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2011. 6. ~ 2015. 8. (5개년)

○ 총사업비 : 5,713백만원(국비 2,857, 시비 2,856)

- 2014년 예산 : 3,136백만원(국비 1,568, 시비 1,568)

○ 위    치 : 지방도 712호선(삼천3동 독배~ 시경계: 금산사선)

○ 사업규모 : L=1.2km, B=14.5m(※총연장 2.4km, 김제 1.2km)

□ 추진상황(공정율 85%)

○ 지방도712호선 위험도로 개선사업에 포함	2010. 10. 13

○ 관계기관협의(도, 김제시등)	2011. 10. 13

○ 설계용역 착수(도 도로관리사업소)	2011. 12.  1

○ 의견청취(도시건설위원회, 주민, 시민단체)	2012.  4. 26

○ 환경 및 교통영향평가 용역착수(도 도로관리사업소)	2012.  9. 18

○ 용역 완료(도 도로관리사업소)	2013.  4. 16

○ 도로구역 결정 고시	2013.  8.  9

○ 공사착수	2013. 12. 20

○ 편입 토지 보상(28필지 11,481㎡)완료	2014.  6. 30

○ 현재 기층포장 완료, 인도 경계석 설치 중

□ 금후계획

○ 공사 완료	2015. 8.

북부권 국도대체우회도로 건설(용정∼용진)

○ 시가지 통과 국도 17,26,27호선 교통량 분산으로 시내권 교통정체 해소

○ 북동부지역 지역개발 촉진 및 광역도시 발전기반 구축

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2006 ～ 2016(11개년)

○ 총사업비 : 2,818억원(국 2,555, 시 263 : 편입용지 보상)

- 기    투    자 : 2,213억원(국 1,965, 시 248)

- 2014년 사업비 :   405억원(국   390, 시  15)

- 이  후  계  획 :    200억원(국    200)

○ 위    치 : 덕진구 용정동 ～ 완주군 용진면 용흥리(국도26호선)

○ 사업규모 : 연장 11.23㎞, 폭 20.0m(전주시 8.4㎞)

편입용지(전주시 570필지 465,811㎡)

○ 시행기관 : 국토교통부(익산지방국토관리청)

□ 추진상황 (공정율 90%)

○ 실시설계 완료	2005. 12. 30

○ 공사 착공	2006.  6. 27

○ 편입토지 매입(547필지 576,008㎡)	2008.4.～2014.8.

□ 금후계획

○ 잔여필지 (23필지 4,703㎡)보상 완료	2014. 12.

○ 전체공사 완공	2016. 12.

북부권 국도대체우회도로 2단계 건설(용진∼우아)

○ 시가지 통과 국도 17, 27호선 교통량 분산으로 시내권 교통정체 해소

○ 북부권 국도대체우회도로(용정～용진) 1단계 사업과 연결 사업으로

북부권 우회 교통망 완성

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2013 ～ 2020(8개년)

○ 총사업비 : 2,235억원(국 1,935, 시 300 : 편입용지 보상)

- 2014년 사업비 :        5억원(국 5)

- 이  후  계  획   :   2,230억원(국 1,930, 시300)

○ 위    치 : 완주군 용진면 용흥리 ～ 완산구 색장동(국도 17호선)

○ 사업규모 : 연장 11.7㎞, 폭 20.0m (전주시 6.1㎞)

○ 시행기관 : 국토교통부(익산지방국토관리청)

□ 추진상황

○ 실시설계 완료	2005. 12. 30

○ 실시설계 보완 용역착수(익산지방국토관리청)	2014.  5. 26

○ 실시설계 용역 주민설명회 실시(우아2동사무소)	2014.  8. 22

□ 쟁점사항 및 대책

○ 백자마을 주민 및 동전주 구세군 교회측 변전소 뒤쪽으로 노선변경 요청

○ 원색장주민 2006년 실시설계 완료된 당초 노선대로 시행 또는

동부우회도로에 접속요청

⇨ 주민의견사항의 의견이 반영될 수 있도록 노선계획 재검토 수립 건의 (전주시 ⇨ 익산지방국토관리청)

□ 금후계획

○ 실시설계 보완 용역 완료(익산지방국토관리청)	2014. 12.

○ 발주(익산지방국토관리청)	2015.  3.

○ 편입용지 (전체 648필지 519,400㎡ 중

전주시 구간 360필지 292,196㎡) 보상추진	2015.  1.

○ 준공예정	2020. 12.

새만금∼전주∼대구∼포항간 고속도로 건설

○ 새만금에서 포항까지 동서축을 잇는 고속형 직통도로 건설

○ 동서 간 교통체계를 개선하고 동서지역의 통합적 발전에 기여

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2010 ∼ 2020 (11개년)

○ 총사업비 : 49,000억원 (새만금 ∼ 전주 17,842억원)

- 기 투자 : 100억원         - 2014년 사업비 : 110억원

○ 위    치 : 새만금 ∼ 김제 ∼ 전주 ∼ 대구 ∼ 포항

○ 사업규모 : 총연장 282.8km (새만금∼ 전주 55.8km)

○ 소    관 : 국토교통부 (한국도로공사)

□ 추진상황

○ ’09 하반기 예비타당성조사 대상사업 선정(기재부)	2009. 11. 5

○ 타당성 조사 완료(국토교통부)	2012. 3.

○ 기획재정부 총사업비 결정(예타 대비 11.5% 증가)	2012. 10. 26

○ 기본 설계 발주(한국도로공사)	2013. 3.

○ 기본설계 노선선정(안) 주민설명회(한국도로공사)	2014.  3. 6

※ 삼천3동 동사무소

□ 쟁점사항 및 대책

○ 중인동 주민, 은석마을 주민 노선변경을 요망하는 집단민원발생

(이서교차로 ∼ 호남고속도로 ∼ 익산장수 간 고속도로 활용 요구)

⇨ 한국도로공사와 협의 최적의 노선선정으로 민원 최소화 노력

□ 금후계획

○ 기본 설계 용역완료	2014. 2.

○ 실시 설계 용역완료	2016. 8.

○ 공사 완료	2020.12.