제336회 전주시의회 제2차 정례회 2016년도 행정사무감사 도 시 건 설 위 원 회

2016년도

주요업무 추진상황 보고

시민안전담당관

보  고  순  서

□	일 반 현 황	-------	1
□	담 당 별 주 요 기 능	-------	2
□	기 본 현 황	-------	3
□	주요업무 추진상황	-------	5

일  반  현  황

□ 기    구 : 4 담 당

				시민안전담당관
안전총괄				안전관리				재난방재				민방위

□ 정․현원

구 분	총 계	일 반 직					기능	비고
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	19	1	4	6	4	4
현 원	19	1	4	10	3	1

담당별 주요기능

담당별	분 장 사 무
안전총괄	○ 안전정책 총괄, 사회재난(생활안전 포함) 업무 총괄 ○ 국제 안전도시 공인사업 ○ 특정관리대상 시설물 관리, 재난관리 자원 조사 ○ 재난대비 훈련(안전한국훈련 등) ○ 안전문화운동, 민간 예찰단 운영, 앱 신고, 재난안전교육 ○ 안전관리계획수립, 사망자수 감축 목표 관리제 ○ 재난시설물 안전점검, 어린이놀이시설 안전점검, 국가안전대진단 ○ 특별사법 경찰업무(셉테드) ○ 긴급 재난발생시 현장출동 확인
안전관리	○ CCTV 설치 및 관리 ○ CCTV 통합관제센터 운영 및 관리 ○ 승강기 유지관리 및 안전관리 업무
재난방재	○ 자연재난 업무 총괄 ○ 재난안전대책본부, 재난상황실 운영, 재난관리시스템 관리 ○ 재난관리기금 관리 및 집행 ○ 재해위험지구 지정 및 관리, 사업추진 ○ 재난예경보 시설 관리, 재난대비 자원조사 ○ 풍수해저감 종합계획 수립, 재해대책 평가, 재해복구계획수립 ○ 재해 예방사업 추진(공사, 보상 등) ○ 지역자율방재단 운영 ○ 지역안전도 업무, 풍수해보험
민 방 위	○ 민방위교육, 인력동원, 민방위시설 및 장비 관리 ○ 을지연습, 충무계획 수립, 화랑훈련 등 ○ 통합방위협의회의 개최, 중점관리대상 자원 확인의 날 행사 ○ 사회복무요원 배치 및 지도 ○ 비상대비 계획수립 및 비상훈련, 예비군 육성자금 지원 등

기  본  현  황

□ 특정관리대상 시설물

(단위: 개소)

합계	시 설 물				건 축 물
	소계	도로 시설	토목공사장등	유원시설	소계	공 동 주 택	다 중 이 용 시 설	지 방 공 공 청 사	대 형 광고물	대 형 건축물	기타
1,827	64	60	2	2	1,763	1,295	312	41	51	53	11

□ 재해위험지구 지정현황

지구명	위 치	면적(㎡)	유형	위험등급	지정고시일 (해제고시일)	비고
어은	진북동 어은,도토리골 일원	416,900	침수위험	가	2010. 2. 26.	’15.9.21. 착공
진기들	전미동2가 1615-1번지 일원	3,633,400	침수위험	가	2010. 2. 26.	’16.1.19. 착공
야전	팔복동1가 일원	1,560,000	침수위험	가	2010. 4. 1.	’14.6.30. 착공
덕적 (해제)	평화동2가 714-9번지 일원	208,000	침수위험	가	2010.4.1. (2014.9.3.)	사업완료
색장 (해제)	색장동 은석교 앞 절개지(춘향로 ~ 국도17호선)	8,000	붕괴위험	가	2010.11.15. (2014.9.3.)	사업완료
원당	완산구 대성동 1030-79번지 일원	72,500	침수위험	나	2015. 9. 4.
중인	완산구 중인동 207-3번지 일원	304,000	침수위험	나	2015. 9. 4.	17년 신규사업 신청
금상	덕진구 금상동 1280-4번지 일원	412,000	침수위험	나	2015. 9. 4.	17년 신규사업 신청
송천1	덕진구 송천동2가 417번지 일원	213,200	침수위험	나	2015. 9. 4.
호성1	덕진구 호성동2가 78-4번지 일원	117,000	침수위험	나	2015. 9. 4.

□ 어린이보호 및 방범용CCTV 설치 현황

총 계		방범용 CCTV		어린이보호구역 CCTV		어린이공원 CCTV		비고
개소	대수	개소	대수	개소	대수	개소	대수
830	1,843	402	843	245	605	183	395

□ 예·경보시설 현황

(단위: 개소)

합계	재해문자전광판	재난감시 CCTV	자동음성 통보	우량관측시설	수위관측시설
26	2	10	3	7	4

□ 민방위 시설

(단위: 개소)

합계	민방공대피소	경보시설	비상급수시설	비 고
399	309	17	73

주요업무 추진상황

□	사회재난 대비 안전도시 조성	----	6p
□	생활 속 시민 안전문화 확산	----	7p
□	국제안전도시 공인사업	----	8p
□	방범용CCTV 구축 및 운영	----	9p
□	자연재난 대비·대응력 제고	----	10p
□	야전 재해위험지구 정비사업	----	11p
□	어은 재해위험지구 정비사업	----	12p
□	진기들 재해위험지구 정비사업	----	13p
□	전주초지구 우수저류시설 설치사업	----	14p
	매화지구 우수저류시설 설치사업	----	15p
	송천1지구 우수저류시설 설치사업	----	16p
	민방위업무 추진	----	17p

사회재난 대비 안전도시 조성

○ 안전한 전주 만들기를 위하여 재난위험시설물 안전점검 및 보수보강 등을 실시하여 시민의 생명과 재산 보호

□ 사업개요

○ 재난상황실 운영 : 24시간 비상근무(1인) 및 비상단계별(4단계) 근무

○ 재난상황의 신속한 대처를 위한 단계적 대응계획 수립·추진

- 안전관리계획 수립 및 표준행동 매뉴얼 정비

○ 재난위험 시설물 안전점검 강화

- 대상시설 : 특정관리대상시설, 지역축제 행사장, 민간다중이용시설 등

- 사업내용 : 재난위험요인 등을 점검하고, 보수·보강 등의 안전조치 실시

○ 재난관리자원 관리 강화

- 재난관리자원 현황 :  34종 37,933점(장비 30종 790점, 자재 4종 37,143점)

□ 추진상황

○ 2016년도 전주시 안전관리계획 수립	’16. 03.

○ 안전도시 조성을 위한 안전점검	연중

- 국가안전대진단 추진 : ’16. 2. ~ 4.

- 지역축제장 안전관리계획 심의 : 10회(10개 축제)

- 재난위험시설물 및 다중이용시설 등 안전점검 : 18회

(해빙기, 가을철, 동절기, 명절, 취약시설 등 수시점검)

○ 민간다중이용시설 위기상황 매뉴얼 작성(5천㎡이상 33개소)	’16. 03.

○ ’17재난관리자원 비축·관리계획 수립	’16. 08.

○ 영남권과 재난관리자원 지원 협약(창원시, 안동시, 경산시)	’16. 11.

□ 금후계획

○ 재난대응 매뉴얼 정비	수시

○ 다중이용시설 등 민간부문 안전점검 지원	연중

○ 특정관리대상시설 조사 및 점검 (1,827개소)	연중

생활 속 시민 안전문화 확산

○ 안전의식 제고를 위한 효과적인 안전교육·훈련 및 홍보 실시로 시민과      함께하는 생활 안전문화 여건 조성 및 확산

□ 사업개요

○ 재난·재해 대비 및 대응역량 강화 : 재난·안전교육 및 훈련 등

○ 시민의 자발적 참여를 통한 위험지역 예찰 활동 및 안전신고 활성화

○ 생활 속 안전문화 정착을 위한 대시민 안전문화 홍보

□ 추진상황

○ 재해·재난 대비 현장훈련실시

- 재난대응 훈련(안전한국훈련)	’16. 05.

- 승강기 갇힘사고 승객구조 훈련	’16. 06.

- 유해화학물질 유출사고 대응훈련	’16. 09.

- 민간다중이용시설 위기상황 매뉴얼에 따른 시범훈련	’16. 11.

○ 안전의식 강화교육 실시

- 심폐소생술 교육(전주시청강당 ’16. 04.) / 재난안전 체험(전북119안전체험관 ’16. 11.)

- 시민을 위한 찾아가는 생활안전교육 실시(완산구청, 덕진구청 ’16. 9.)

- 취약계층을 위한 찾아가는 생활안전교육 실시(덕진노인복지회관)	’16. 10.

○ 시민안전 및 불편해소를 위한 안전점검 및 예찰활동	연중

- 재난예방 민간예찰단 구성·운영                    : 33개동 128명

- 대시민 안전문화 확산을 위한「안전점검의 날」운영 : 11회

- 안전신문고를 통한 안전위해요소 ‘앱’ 신고        : 1,253건

□ 금후계획

○ 안전점검의 날 지속운영(안점점검 및 시민참여 캠페인 등)	월 1회

○ 재난안전 대비 민간단체 예찰활동(민간예찰단, 안전모니터 봉사단 등)	수시

○ 생활위험요소 신고를 위한 안전신문고 ‘앱’대시민 홍보	연중     ○ 구․동 담당자 및 안전민간단체 합동간담회 개최	’16. 12.

국제안전도시 공인사업

○ 국제기준에 맞는 안전증진사업 지속 추진으로 안전환경을 제공하여        시민이 안전하고 행복한 전주 구현

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2015. 4. ∼ 2018. 2.

○ 총사업비 : 364백만원(시비)

○ 사업내용 : 국제안전도시 공인(협약, 공인조건 추진, 공인 신청)

- 안전도시 만들기 기본조사 연구용역

- 상호 협력기반 마련(조례 제정, 위원회 구성)

- 공인조건 프로그램 운영, 수행과정 및 효과 평가 등

□ 추진상황

○ 국제안전도시 만들기 기본조사 연구용역 추진	’15. 04. ~ ’16. 02.

- 착수보고 및 설명회(’15. 5.) / 중간보고회(’15.11.) / 최종보고회(’16. 2.)

○ 안전도시 조례 제정	’15. 08. 18.

○ 전주시 안전도시협의회 및 실무위원회(분과위원회) 구성	’15. 10. 08.

○ 국제안전도시 공인사업 업무협약 체결(지원센터)	’15. 12. 14.

○ 국제안전도시 공인사업 기본계획 수립	’16. 03. 31.

○ 국제안전도시 만들기 안전체험 워크숍	’16. 10. 26.

○ 국제안전도시 실무분과위원 간담회 개최 (8회)	분기별

□ 금후계획

○ 국제안전도시 공인기준에 의한 사업 추진	’16. 1.  ~ ’17. 10.

- 국제안전도시 공인 평가기준(7가지) 사업

○ 국제안전도시 공인신청 및 평가	’17. 7. ~ ’17. 10.

○ 국제안전도시 공인	’17. 12.

○ 국제안전도시 공인식 개최	’18. 02.

방범용 CCTV 구축 및 운영

○ 어린이 보호 및 방범용 CCTV 설치로 365일 안전한 도시 구현

○ 24시간 CCTV 관제업무 수행으로 범죄 예방 및 사고 시 즉각 대응

□ 사업개요

○ 어린이보호 및 방범용 CCTV 통합 구축

- 사 업 비 : 1,547백만원(방범용 501, 학교 804, 공원 242)

- 사업규모 : 83개소 236대 설치

․ 어린이보호 : 40개소 120대  ․ 어린이공원 : 13개소 26대

․ 방  범  용 : 30개소 90대

○ 마을방범 CCTV 구축

- 사 업 비 : 42백만원(주민참여예산 및 보조금)

- 사업규모 : 7개소 14대 설치

- 사업대상 : 전미동 진조리마을 외 6개소 (시 외곽 자연마을)

○ CCTV 통합관제센터 운영

- 위    치 : 시청 8층, 면적 280㎡

- 사 업 비 : 1,104백만원(운영비 301, 민간이전 463, 자산취득비 340)

- 근무인원 : 18명(관제요원 15, 경찰 3) / 3조 2교대

- 관제대수 : 1,843대(방범용 843, 어린이보호 605, 어린이공원 395)

- 운영방법 : 민간위탁(전라보안공사)

□ 추진상황

○ 방범용 CCTV 설치장소 추천 및 주민의견 수렴	’15. 12. ~ ’16. 01.

○ 설계 및 과업지시서 작성, 일상감사	’16. 01. ~ 02.

○ 어린이보호 및 방범용 CCTV 설치 및 교체 (200대)	’16. 04. ~ 10.

○ 영상 저장용 스토리지 및 서버 설치	’16. 07. ~ 10.

□ 금후계획

○ CCTV 통합관제센터 운영(관제, 경고방송 실시 등)	연중

○ 방범용 및 마을방범용 CCTV 설치 공사 마무리	’16. 12.

자연재난 대비·대응력 제고

○ 사전예측을 통한 선제적 상황관리체계 운영 및 인명피해 우려지역 등 지속적 점검 및 예찰로 인명피해 최소화

□ 사업개요

○ 한 단계 빠른 상황판단회의 운영 및 비상근무 실시

- 기상 상황에 따라 5단계(평상시, 보강단계, 비상 3단계) 상황유지

○ 재난관리기금 운용 및 재해예방사업 추진

○ 자연재난 대비 매뉴얼 수립 및 상황전파·초동대처 훈련 실시

○ 재해 취약시설 점검·정비 및 신속한 복구 지원

□ 추진상황

○ 24시간 상시 비상근무체계 구축 및 재난상황근무 강화	연중

○ 재난관리기금 사업 선정 및 추진(9개 사업 1,432백만원)	’16. 01. ~ 12.

○ 자연재난 대응 매뉴얼 정비	’16. 04.

○ 여름철 자연재난 대비 재난안전대책본부 운영	’16. 05. ~ 10.

○ 현장중심 신속 대응 가능한 재난대비 예·경보 시스템 구축	연중

○ 재해 취약시설 점검·정비 실시 : 11회

-  정기(분기별) 4회, 수시 7회(호우2, 태풍2, 강풍1, 대설2)

○ 자연재해 피해조사 입력 및 긴급 재난지원금 지급

- 강풍(3농가/22,654천원), 폭염(123농가/14,875천원) 호우(2동/9,500천원)

○ 풍수해보험 홍보 및 보험가입 추진(8,058건)	’16. 05. ~ 08.

□ 금후계획

○ 재해 응급복구 및 예방사업 재난관리기금 신속 지원	수시

○ 기상특보 등 사전예측을 통한 취약시설 수시 점검·정비	수시

○ 신속한 복구계획 수립을 위한 재난관리시스템(NDMS) 관리	연중

야전 재해위험지구 정비사업

○ 집중호우 시 전주천 수위상승으로 홍수위보다 낮은 야전지구의

침수피해를 예방하여 시민의 생명과 재산 보호

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 팔복동 야전마을 일원

○ 사업규모 : 관로 정비 3.4km, 유수지 설치 1개소, 펌프 5개소 설치

○ 총사업비 : 34,000백만원(국 16,529, 도 6,538, 시 10,933)

- 기투자 : 17,323백만원(국   8,190, 도 3,203, 시  4,127, 특교 1,803)

- 2016년 :  8,000백만원(국   4,000, 도 1,600, 시  2,400)

○ 사업기간 : 2013년 ∼ 2017년 (5개년)

□ 추진상황

○ 자연재해위험지구 지정	’10. 02.

- 유형 : 침수 위험지구(가등급), 지정면적 : 1,560,000m²

○ 기본 및 실시설계용역 추진	’13. 05. ~ ’14. 10.

○ 국민안전처 사전설계 심의(2회)	’14. 01. ~ 04.

○ 행정절차이행(설계자문위원회 자문, 일상감사 등)	’14. 05.

○ 공사 추진(공정 53%)	’14. 06. ~

- 1~2차분 (’14~16년) 준공 : 관로 정비 L=1.89km, 펌프설치 2개소

- 3차분(’16~17년)        : 관로 정비 L=0.9㎞,   펌프설치 2개소

□ 금후계획

○ 편입용지 등 보상 및 연차별 공사 추진	’16. 11. ~ ’17. 12.

- 펌프설치 3개소, 관로정비 L=0.61km

- 유수지(19,397㎡) 편입용지 보상 및 공사 추진

어은 재해위험지구 정비사업

○ 집중호우 시 전주천 수위상승으로 홍수위보다 낮은 어은지구의

침수피해를 예방하여 시민의 생명과 재산 보호

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 진북동 어은․도토리골 일원

○ 사업규모 : 배수펌프 5개소 설치, 관로 정비 1.1㎞ 등

○ 총사업비 : 16,500백만원(국 8,250, 도 3,300, 시 4,950)

- 기투자 : 5,600백만원(국 2,800, 도 1,120, 시 1,680)

- 2016년 : 7,900백만원(국 3,950, 도 1,580, 시 2,370)

○ 사업기간 : 2014년 ∼ 2018년 (5개년)

□ 추진상황

○ 자연재해위험지구 지정	’10. 02.

- 유형 : 침수위험지구(가등급), 지정면적 : 416,900m²

○ 기본 및 실시설계용역 추진	’14. 06. ~ ’15. 09.

○ 국민안전처 사전설계 심의	’15. 02.

○ 행정절차이행(설계경제성 검토, 설계자문위원회 심의 등)	’15. 03. ~ 09.

○ 공사추진(공정 32%)	’15. 09. ~

- 1차분(’15~16년) : 배수펌프 설치 2개소, 유입관로 L=0.4km 등

- 2차분(’16~18년) : 배수펌프 설치 3개소, 유입관로 L=0.7km 등

□ 금후계획

○ 연차별 공사 추진	’16. 11. ~ ’18. 08.

- ’17년 주요계획 : 배수펌프 설치 3개소, 관로 정비 L=0.7km 등

진기들 재해위험지구 정비사업

○  집중호우 시 전주천 ․ 만경강의 수위상승으로 홍수위보다 낮은

진기들 지구의 침수피해를 예방하여 시민의 생명과 재산보호

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 전미동2가 1615-1번지 일원

○ 사업규모 : 펌프장 설치 1개소, 유수지 설치 1개소, 배수로 개선 2.1km 등

○ 총사업비 : 26,500백만원(국 13,250, 도 5,300, 시 7,950)

- 기투자 :  7,004백만원(국  3,400,  도 1,360, 시 2,244)

- 2016년 :  8,630백만원(국 4,315,   도 1,726, 시 2,589)

○ 사업기간 : 2014년 ∼ 2018년 (5개년)

□ 추진상황

○ 자연재해위험지구 지정 및 관리	’10. 02.

- 유형 : 침수위험지구(가등급), 지정면적 : 3,633,400㎡

○ 기본 및 실시설계용역 추진	’14. 06. ~ ’15. 06.

○ 사전설계 심의(국민안전처)	’15. 07.

○ 행정절차이행(설계자문위원회 심의, 계약심의 등)	’15. 10. ~ 11.

○ 공사추진(공정 12%)	’16. 1. ~

- 1차분(’16~17년) : 배수펌프 설치 1개소, 유수지 1개소 등

○ 편입토지(유수지) 수용재결 절차 이행	’16. 6. ~ 10.

□ 금후계획

○ 편입용지 등 보상 및 연차별 공사 추진	’16. 11. ~ ’18. 09.

- ’17년 주요계획 : 배수펌프장 설치 1개소, 유수지 설치 1개소,

배수로 개선 1.0km, 교량 3개소 등

- 배수로 구간 편입용지 보상 추진

전주초지구 우수저류시설 설치사업

○ 저지대 상습 침수지역을 홍수 피해로부터 예방하고, 저류된 빗물을

대체 수자원으로 활용하고자 함

□ 사업개요

○ 위    치 :  전주시 덕진구 완산구 태평동 210-2번지 일원

○ 사업규모 : 저류시설 6,800㎥,  수문형 펌프 260㎥/min, 배수로 정비 0.5km 등

○ 총사업비 : 12,450백만원(국 6,225, 도 1,867, 시 4,358)

- 기투자 :  1,000백만원 (국  500, 도   150, 시   350)

- 2016년 :  2,800백만원(국 1,400, 도   420, 시   980)

○ 사업기간  : 2015년 ∼ 2017년 (3개년)

□ 추진상황

○ 우수저류시설 사업대상지 제출 및 심의ㆍ선정	’14. 04. ~ 10.

○ 우수저류시설 사업계획 수립 및 추진방향 검토	’15. 01. ~ 04.

○ 기본설계용역 추진	’15. 06.

○ 국민안전처 사전설계검토	’15. 10.

○ 사업비 확정	’15. 11.

○ 기본설계 완료	’15. 12.

○ 실시설계용역 착수	’16. 04. ~

□ 금후계획

○ 국민안전처 사전설계검토	’16. 11.

○ 행정절차(원가심사 등) 이행 및 공사 발주	’16. 12.

○ 공사 착공(우수저류시설 설치 및 관로 매설)	’17. 3. ~  12.

매화지구 우수저류시설 설치사업

○ 저지대 상습 침수지역을 홍수 피해로부터 예방하고, 저류된 빗물을

대체 수자원으로 활용하고자 함

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 팔복동 2가 180번지 일원

○  사업규모  : 저류시설 13,200㎥,  수문형 펌프 40㎥/min, 관로정비 1.2km 등

○ 총사업비 : 15,600백만원(국 7,800, 도 2,340, 시 5,460)

- 기투자  :  2,000백만원(국 1,000, 도   300, 시   700)

- 2016년 :  2,800백만원(국 1,400, 도   420, 시   980)

○ 사업기간 : 2015년 ∼ 2017년 (3개년)

□ 추진상황

○ 우수저류시설 사업대상지 제출 및 심의ㆍ선정	’14. 04. ~ 10.

○ 우수저류시설 사업계획 수립 및 추진방향 검토	’15. 01. ~ 04.

○ 기본설계용역 추진	’15. 06. 09.

○ 국민안전처 사전설계검토	’15. 10.

○ 사업비 확정	’15. 11.

○ 기본설계 완료	’15. 12.

○ 실시설계용역 착수	’16. 04. ~

□ 금후계획

○ 국민안전처 사전설계검토	’16. 11.

○ 행정절차(원가심사 등) 이행 및 공사 발주	’16. 12.

○ 공사 착공(우수저류시설 설치 및 관로 매설)	’17. 3. ~  12.

송천1지구 우수저류시설 설치사업

○ 저지대 상습 침수지역을 홍수 피해로부터 예방하고, 저류된 빗물을

대체 수자원으로 활용하고자 함

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 송천동2가 597-4번지 일원

○ 사업규모  : 저류시설 18,500㎥, 수문형 펌프 1개소, 관로 개선 1.18km

○ 총사업비 : 17,000백만원(국 8,500, 도 2,550, 시 5,950)

- 2016년 :  1,000백만원(국    500, 도    150, 시   350)

○ 사업기간 : 2016년 ∼ 2018년 (3개년)

□ 추진상황

○ 우수저류시설 신규 사업대상지 신청	’15. 04.

○ 신규 사업대상지 국민안전처 현장실사	’15. 06.

○ 신규사업 대상지 선정 심의회(국민안전처)	’15. 10.

○ 신규사업 선정 및 국비 확정 통보	’15. 12.

○ 기본․실시설계(용역과제, 일상감사 등) 이행	’16. 01. ~ 03.

○ 기본․실시설계 용역 착수	’16. 04. ~

□ 금후계획

○ 국민안전처 사전설계검토	’17. 02.

○ 행정절차(원가심사 등) 이행 및 공사 발주	’17. 03.

○ 공사 착수(우수저류시설 설치 및 관로 매설)	’17. 05. ~ ’18. 12.

민방위업무 추진

○ 전시 또는 이에 준하는 비상사태 발생 등 언제 일어날지 모르는

위협으로부터 국민의 생명과 재산을 보호하고자 함

□ 사업개요

○ 전시 대비 충무계획 수립 : 총괄 실시계획, 인력동원 실시계획

○ 을지연습 및 화랑훈련 추진 : ’16. 8. ~ 9.

○ 통합방위협의회의 개최 : 연 4회

○ 민방위 편성(20~40세 남자) : 39,698명

- 1~4년차 17,139명, 5년차 이상 22,559명

○ 민방위 시설․장비 점검 및 정비

- 대피시설 309개소, 경보시설 17개소, 급수시설 73개소

□ 추진상황

○ 2016년도 충무계획 수립	’16. 01.

○ 2016년도 민방위대 편성	’16. 01.

○ 통합방위협의 회의 개최(3회)	’16. 03. / 06. / 08.

○ 2016년 민방위 교육 실시(44회)	’16. 04. ~ 11.

○ 민방위 시설․장비 일제 점검	’16. 06. / 11.

○ 2016년 을지연습 실시	’16. 08. 22. ~ 25.

○ 2016년 화랑훈련 실시	’16. 09. 26. ~ 30.

□ 금후계획

○ ’16년 4분기 통합방위협의 회의 개최	’16. 12.

○ 민방위 시설․장비 일제 점검	수시

○ 2017년도 충무계획 수립	’16. 12.