제362회 전주시의회 임시회

복 지 환 경  위  원  회

2019년도

주요업무 추진상황 보고

맑은물사업본부

보  고  순  서

□

일     반     현     황

-------

1

□

부 서 별  주 요 기 능

-------

2

□

기     본     현     황

-------

3

□

주요업무 추진계획

○

수     도     행     정     과

-------

5

○

급            수            과

-------

10

○

수     질     관     리     과

-------

19

○

하            수            과

-------

24

일  반  현  황

□ 기   구 : 4과 15팀

맑은물사업본부

수도행정과

(4팀)

급  수  과

(4팀)

수질관리과

(3팀)

하  수  과

(4팀)

수도행정

맑은물공급

수질관리

하수행정

완산요금

급수시설

수질분석

하수시설

덕진요금

누수방지

시설관리

하수정비

체납징수

계량기관리

지하수관리

※ 서신통합센터, 누수신고센터, 계량기시험소, 사업장 15개소(취수장 1, 배수지 10, 정수장 1, 가압장 3)

□ 정‧현원

부서

직렬

정 원

현              원

계

수도행정과

급 수 과

수질관리과

하 수 과

합  계

86

77

17

20

26

14

일  반  직

소계

83

74

17

20

23

14

4급

1

1

1

-

-

-

5급

4

3

1

-

1

1

6급

23

25

5

5

12

3

7급

29

23

7

6

4

6

8급

13

9

2

3

1

3

9급

13

13

1

6

5

1

연 구 직

3

3

-

-

3

-

※ 공무직 36명 (수도행정과 13, 급수과 19, 수질관리과 2, 하수과 2), 청경 3명(수질관리과) 부서별 주요기능

과    별

분    장    사    무

수도행정과

○ 맑은물사업본부 운영 총괄

○ 상수도공기업 특별회계 운영

○ 공사 및 용역 계약, 물품관리

○ 상수도요금 조정 및 관련조례 제․개정

○ 검침업무 운영 및 관리

○ 상하수도요금 과징업무 전반

급  수  과

○ 상수도 전면개량을 통한 맑은물 공급사업

○ 상수도 중장기계획 수립․시행

○ 비상급수계획 및 대책수립 총괄

○ 급수공사, 상수도 증설 및 확장공사

○ 간이상수도 유지관리업무

○ 누수탐사 및 누수복구업무, 누수방지대책 수립

○ 누수신고센터 운영관리

○ 급수중지․개전․폐전에 따른 계량기 관리

○ 고장․노후계량기 교체관리

○ 계량기시험소 운영관리

수질관리과

○ 생활용수 공급 및 공업용수 생산․공급

○ 광역상수도 수요에 따른 수급조절 및 관리

○ 각 사업장 구축물․건물 유지보수 및 안전관리

○ 국가공인수질검사기관 적정운영 및 정도관리

○ 먹는물 공동시설(약수터) 및 간이상수도 수질검사

○ 상수도 원․정수 수질관리 및 보전

○ 상수원보호구역 관리

하  수  과

○ 하수도정비 기본계획(변경) 수립

○ 하수도공기업 특별회계 운영

○ 효율적인 지하수 및 빗물이용 관리

○ 하수관로 정비사업

○ 하수관로정비 민간투자(BTL)사업 유지관리

○ 마을하수도 시설 및 유지관리

○ 하수처리장 운영관리 및 시설물 유지관리

기  본  현  황

(2019. 6.  30일 기준)

□ 급수현황

총인구

(명)

급수인구

(명)

보급율

(%)

1일 1인

급수량(ℓ)

급수전

(개)

유수율

(%)

급수량(천㎥/일)

계

생활

용수

공업

용수

653,965

651,349

99.6

347.6

237,836

78.52

268

233

35

□ 상수도관

(단위 : ㎞)

총 연 장

도․송수관

배 수 관

급 수 관

비 고

2,484

75

867.1

1,512

□ 상수원 보호구역

구  분

보  호  구  역

구역지정일

보호시설

면적(㎡)

상류(m)

하류(m)

안내판

표주

방수리

284,775

1,000

500

‘72. 5. 5.

8

26

□ 상수원 수계별 『댐』 저수량

수   원

위   치

만수량(천㎥)

관리기관

비   고

용 담 댐

진 안 군

815,000

수자원공사

전주권광역

□ 하 수 도

구   분

처리구역

(㎢)

계획연장

(㎞)

시설연장

(㎞)

하수인구

보급율

(%)

계

202.5

2,330

1,694

98.6

합  류  식

0

401

분

류

식

소  계

202.5

2,330

1,293

오수관거

1,103

770

우수관거

1,227

523

□ 차집관로

하    천    명

연 장

(㎞)

맨 홀

(개)

환기구 (개소)

우수토실

(개소)

계

88.9

1,010

73

251

전주천 (좌, 우안)

25.3

369

37

142

삼  천 (좌, 우안)

12.3

155

18

45

금암천 (좌, 우안)

4.4

82

9

38

아     중     선

12.0

174

4

16

팔복선(공장,생활)

16.9

183

5

8

상   관   선

10.4

47

2

기타(구화천,태평로,

연화천,덕적천,중복천)

7.6

□ 하수․위생처리 시설

구    분

환  경  사  업  소

수 질 복 원 센 터

위    치

전주시 덕진구 고내천변로 58

전주시 덕진구 중동로 150

면    적

320,990㎡

30,182㎡

시설규모

(처리용량)

규 모  : 403,000㎥/일

- 1단계 : 113,000㎥ (1990년)

- 2단계 : 190,000㎥ (1997년)

- 3단계 : 100,000㎥ (2005년)

규  모 :  16,500㎥/일

(2015년)

부대시설

° 위생처리장(290㎘/일)       : 2002년

° 총인처리시설(403,000㎥/일)  : 2015년

° CSOs처리시설(100,000㎥/일) : 2015년

수도행정과 소관

□

신뢰받는 수도행정을 위한 사전 홍보 강화

----

6

□

수도계량기 옥외 화상검침기 설치확대

----

7

□

체계적인 요금 부과를 위한 자료 일제정비

----

8

□

상·하수도 체납요금 징수율 제고

----

9

완산·덕진요금팀

신뢰받는 수도행정을 위한 사전 홍보 강화

○ 사전 문자 알림 서비스 및 사전 예고장을 통하여 상수도 체납 단수 및

누수 민원 발생 요인을 차단하고 신뢰 받는 수도행정 구현

□ 사업개요

○ 대    상

- 상수도 요금 체납자 중 단수 예정 수용가

- 상수도 월 30㎥이상 사용 수용가중 평소 사용량의 2배 사용자

- 월 0㎥사용 수용가

○ 내    용 : 사용료 체납 단수 예고 및 누수 및 과다 사용 고지

○ 고지방법

- 1차 : 「빨간 신호등이 켜졌습니다」예고장 및 계고장 부착

- 휴대폰 문자서비스 안내

□ 추진상황

○ 수돗물 과다 사용(전월대비 30%이상) 수용가 예고 : 매월 15,000건 정도

○ 체납 단수 예고 계고장 부착(9,321건)                   : ’19. 6.

□ 문제점 및 대책

○ 그동안 알림장 및 계고장 부착으로 통지하고 있으나 사전인지를

못했다는 이유로 잦은 민원 발생

□ 사전 예고와 문자알림 서비스를 통하여 민원해소 및 수도서비스 만족도 증진

□ 금후계획

○ 전월대비 30% 이상 과다 사용 수용가 지속적인 예고     : 연중

○ 민원서비스 개선에 대한 검침원 · 단속반 교육	: 매월

○ 수돗물 0㎥ 수용가 일제 점검                           : ’19. 9월

- 3개월 이상 0㎥ 수용가 원인 분석후 요금추징, 폐전, 중지 등 조치

완산·덕진요금팀

수도계량기 옥외 화상검침기 설치확대

○ 계량기 설치 위치 부적정 등으로 인한 검침곤란 상수도 수용가에

옥외 화상검침기를 설치하여 정확한 검침으로 상수도 요금부과에

따른 행정의 신뢰성 확보

□ 사업개요

○ 기    간 : 2019. 1. ∼ 12.(연중)

○ 대    상 : 일반주택 및 공동주택 주 계량기

- 철판, 주철관 등 무거운 것으로 덮여 있는 장소

- 지하실, 화장실, 집안 주방 등 설치 위치가 부적절한 장소

- 맨홀, 화단, 도로변 등 검침이 어려운 장소

○ 방    법 : 위탁검침원의 검침곤란 계량기 실태조사

○ 사업내용 : 검침곤란 수용가 화상검침기 설치

○ 소요예산 : 40백만원

□ 추진상황

○ 검침이 곤란한 대상지 실태조사(200여개소, 각구별 100)  : ’19. 4.

- 186개소 (완산 93, 덕진 93)

○ 1차분 설치를 위한 현지실사 및 최종 대상지 선정       : ’19. 5.

- 117개소(완산 69개소 ,덕진 48개소)

○ 화상검침기 설치 실적 : 69개소 설치완료               : ’19. 6.

□ 금후계획

○ 2차분 검침곤란 화상검침 대상 실태조사               : ’19. 9월

- 129개소(완산 84, 덕진 45)

○ 2차분 화상검침기 설치 예정지역 현시실사 및 선정 후 설치 : ’19.10월

- 153개소(완산 60, 덕진 93)

완산·덕진요금팀

체계적인 요금부과를 위한 자료 일제정비

○  수도계량기 검침설비 구축·관리와 수용가 부과자료의 철저한 정비로

정확한 상·하수도 요금부과를 통한 신뢰받는 상수도 행정구현

□ 사업개요

○ 검침전수 : 237,836전 (일반주택 79,003, 공동주택 158,833)

○ 검 침 원 : 173명 (일반주택 74, 공동주택 99)

○ 기준요금 : 1,120원/㎥ (상수도 720, 하수도  400)

※ 가정용 기준 20㎥이하

○ 부과현황

(단위 : 백만원)

구분

2019. 6월말

2018년 6월말

합계

상수도

하수도

합계

상수도

하수도

계

62,457

32,985

29,472

61,979

33,056

28,923

가 정 용

28,046

18,354

9,692

27,756

18,179

9,577

일 반 용

25,295

12,294

13,001

25,757

12,566

13,191

대중탕용

1,221

422

799

1,091

379

712

공 업 용

7,895

1,915

5,980

7,373

1,930

5,443

□ 추진상황

○ 기초생활수급자 · 모범음식점 등 감면자료 점검        : 월 1회

○ 검침자료 대사 ·오류사항 정정 등                     : 월 1회

□ 금후계획

○ 요금 및 검침관련 직원, 검침원 직무교육 강화             : 월 1회

○ 부정급수 점검 및 단속실시                              : ’19. 9월

- 택지개발지구 등 건축공사장, 미사용 수용가 등 무단 급수시설장치 등

○ 다량 급수업소 일제점검 실시                            : ’19.10월

- 일반용 300㎥ 이상, 대중탕용 1,500㎥ 이상 사용자에 대하여

연초 대상 선정 후 분기별 지속적인 누적관리

체납징수팀

상·하수도 체납요금 징수율 제고

○ 상·하수도 체납자에 대한 독려, 단수예고, 정수처분을 통한 체납요금 조기징수

자진 납부의식 제고와 상습 고액체납자 징수강화로 안정적인 세입확보

□ 과징현황 (2019. 5. 31. 기준)

(단위 : 백만원)

구    분

조정액

징수액

결 손

체납액

징수율(%)

합    계

54,824

52,181

16

2,627

95.18

상수도

계

28,987

27,541

11

1,435

95.01

현년도

27,498

26,374

0

1,124

95.91

과년도

1,489

1,167

11

311

78.37

하수도

계

25,837

24,640

5

1,192

95.37

현년도

24,573

23,692

0

881

96,41

과년도

1,264

948

5

311

75.00

□ 추진상황

○ 체납 상하수도사용료 특별징수기간 운영 : 1회 (4.20∼5.31.)

- 징수금액 1,411백만원(목표 1,300백만원 대비 108.5% 달성)

○ 체납수용가 단수계고 : 9,321전 54,833건 2,429백만원

○ 단수처분 및 해제 : 단수 1,378전 437백만원 (개전 1,229전 374백만원)

○ 고액체납자 재산조회 및 재산압류 추진 : 17명 133백만원

□ 금후계획

○ 하반기 체납 상하수도사용료 특별 징수기간 운영 : 2회(9월, 12월)

○ 1백만원 이상 고질체납자 부동산, 채권 등 각종 재산 압류추진

○ 2개월 이상 체납수용가 단수처분 계고장 발송 : 월 1회

○ 상하수도사용료 장기 고액체납 수용가 집중관리

- 다세대(가구)주택, 음식점, 목욕탕업, 집합상가 등

급 수 과  소 관

□

맑은물공급사업(노후상수관망 정비) 2단계

----

11

□

종합리싸이클링타운 공업용수 배수관로 신설공사

----

13

□

소규모 배수관 포설공사

----

14

□

덕진구 변방동(화전동) 노후관 교체공사

----

15

□

장승배기로 노후관 교체공사

----

16

□

노후 상수도 관세척 공사

----

17

□

노후 및 고장계량기 교체사업

----

18

맑은물공급팀

맑은물공급사업(노후상수관망정비) 2단계

○ 유수율 85%이상 향상으로 선진화된 급수체계 구축과 맑고 깨끗한      수돗물을 공급함으로써 상수도 경영합리화 및 시민이 직접 느낄수      있는 상수도 수질개선 도모

□ 사업개요

○ 사업위치 : 89개 블록 (1단계 미정비블록 78개,1단계 제외 11개)

○ 사업규모 : 노후 상수관 전면개량 409km정도

- 2단계 1차분(2017∼2019) : 노후 관로 개량 36km(7개블록/5개동)

- 2단계 2차분(2018∼2020) : 노후 관로 개량 26km(6개블록/4개동)

- 2단계 3차분(2019∼2021) : 노후 관로 개량 42km(5개블록/2개동)

○ 사업기간 : 2017. ∼ 2024.(8개년)

○ 총사업비 : 1,200억원정도

1단계 정비 구역(50개블록)

2단계 1차 사업 구역(7개블록)

2단계 2차사업 구역(6개블록)

2단계 3차사업 구역(5개블록)

□ 추진상황

○ 맑은물공급사업 (노수상수관망정비)1단계 추진완료     : ’09. 4. ∼ ’16.12.

- 50개 블록 정비 및 고립 완료, 78개 블록 고립 완료(사업비 1,612억원)

○ 맑은물공급사업 (노후상수관망정비)2단계 중기지방재정계획 수립    : ’15.12.

○ 맑은물공급사업 2단계 1차분 공사추진                : ’17. 6. ∼ ’19. 8.

○ 맑은물공급사업 2단계 2차분 공사추진               : ’18.10. ∼  ’20. 6.

□ 금후계획

○ 맑은물공급사업 2단계 1차분 공사완료 : ’19. 8월

- 사업위치 : 효자 및 대성급수구역 7개블록 (효자3-3,3-5,대성2-4,2-5,3-1,3-4,3-5)

- 사 업 비 : 10,581(도급 6,877, 관급 2,339 , 폐기물 538, 감리 827)백만원

- 사업내용 : 노후관 교체 36km 등

○ 맑은물공급사업 2단계 2차분 공사추진              : ’18.10. ∼ ’20. 6월

- 사업위치 : 인후급수구역 6개 블록 (인후1-1∼5, 6-4)

- 사 업 비 : 10,567(도급 6,867, 관급 2,287 , 폐기물 599, 감리 814)백만원

- 사업내용 : 1단계제외 블록 고립(11개블록) 및 노후관 교체 26㎞

○ 맑은물공급사업 2단계 3차분 기본 및 실시설계용역추진    : ’19. 3. ∼ ’19.10월

- 사업위치 : 서신급수구역 5개 블록 (서신1-1∼2, 2-1∼3)

- 용 역 비 : 811백만원

- 사업내용 : 실시설계용역 1식 (서신급수구역 노후관 정비 42㎞)

급수시설팀

종합리싸이클링타운 공업용수 배수관로 신설공사

○ 삼천동 자원순환단지, 종합리싸이클링타운 지역 공업용수 공급을 위한      배수관로를 신설하여 특화단지 공장 활성화 및 종합리싸클링타운 수도      요금 절감으로 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 사업위치 : 한국농수산대학 ∼ 전주리싸이클링타운(삼천동3가 749-5)

○ 사업규모 : 공업용 배수관로 신설(D=200㎜, L=4.8㎞), 가압장 1개소

○ 총사업비 : 1,800백만원(일반회계 900, 특별회계 900)

○ 사업기간 : 2019. 2. ∼ 2019. 8.

□ 위 치 도

□ 추진상황

○ 행정절차 이행(일상감사 및 계약심사)          : ’19. 1. ∼ ’19. 2.

○ 공사 착공                                          : ’19. 4.19.

○ 공사 중지(해제일 : 6. 3)                             : ’19. 5.10.

○ 공사 재착공                                         : ’19. 6. 3.

□ 금후계획

○ 공사 준공                                          : ’19.11월

급수시설팀

소규모 배수관 포설공사

○ 시 외곽지역 개발행위 등으로 상수도 공급지역 확장, 출수 불량 및

수압저하 등 상수도 공급민원 해소 및 출수불량 지역을 해결하여

보다 위생적인 생활환경 조성

□ 사업개요

○ 사업위치 : 전주시 관내 16개소

- 난전들로, 흑석2길, 객원길, 태평3길, 바람쐬는길, 춘향로(덕산마을 인근), 암실길, 완주로(고당네거리 부근), 신흥마을길, 동부대로, 모악산자락길, 평화5길, 삼례로, 신흥안길, 가리내로, 과학로 등

○ 사업규모 : 상수관로(D=50∼150㎜, L=7.0㎞) 매설

○ 총사업비 : 1,300백만원

○ 사업기간 : 2019. 2. ∼ 2019.12.

□ 추진상황

○ 미급수 세대 현장 조사 및 발굴               : ’18.10. ∼ ’18.12.

○ 실시설계용역 추진                           : ’18.12. ∼ ’19. 2.

○ 상반기 배수관 공사 추진(12개소)             : ’19. 3. ∼ ’19. 6.      - 공사완료(7개소, L=3.4km(D=50∼150mm)

- 진 행 중(5개소, L=1.8km(D=80∼100mm)

□ 금후계획

○ 상반기 잔여 공사 준공(5개소)                 :  ’19. 7. ∼ 8월

○ 행정절차 이행(도로굴착 심의 등)              :  ’19. 8. ∼ 9월

○ 하반기 공사 발주 및 완료(4개소)              :  ’19. 9. ∼ 12월

- 가리내로, 삼례로, 신흥안길, 과학로

누수방지팀

덕진구 변방동(화전동) 노후관 교체 공사

○  덕진구 외곽지역인 화전동 화전마을 등 사유지(논·밭)에 매설된

노후 상수도관을 정비하여 안정적으로 맑고 깨끗한 물을 공급하고자 함

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 화전동 화전마을 ∼ 도덕동 고잔마을

○ 사업규모 : 노후관 교체(D=100∼150mm, L=6.8㎞)

- 2019년 : 신평마을∼굴신마을(PVC/1982년도), D=150mm, L=1.1㎞

○ 사 업 비 : 400백만원

○ 사업기간 : 2019. 1. ∼ 2019.12.

□ 추진상황

○ 반월교차로∼원화전마을, L=1,430m(300백만원)       : ’17. 3. ∼ 6.

○ 원화전마을∼신평마을, L=820m(400백만원)           : ’18. 8. ∼11.

○ 굴신마을구간 현지조사 및 실시설계용역 추진     : ’19. 1. ∼ 3.

○ 행정절차(일상감사 등) 이행                       : ’19. 2. ∼ 4.

○ 공사 발주 및 착공                                : ’19. 5. ∼ 6.

※ 모내기 등 농사철 이후 작업 예정(7월부터 공사 예정)

□ 금후계획

○ 공사 추진 및 완료                                     : ’19. 9.

누수방지팀

장승배기로 노후관 교체공사

○ 80년대 기매설된 장승배기로 노후관 상수도 잦은 누수로 교체가 시급하며 효율적인 관망관리로 맑은물공급 및 시민불편 해소

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 평화동 장승배기로(농협장승배기지점∼싸전다리)

○ 사업규모 : 노후관 교체(D=300mm, L=1,685m)

○ 사 업 비 : 1,036백만원(1차분 166백만원, 2차분 870백만원)

○ 사업기간 : 2019. 1. ∼ 2019.12.

□ 추진상황

○ 장승배기로 노후관 교체공사(1차분) 착공               : ’18.12.24.

○ 장승배기로 노후관 교체공사(1차분) 동절기 공사 중지     : ’19. 1.

○ 장승배기로 노후관 교체공사(2차분) 일상감사 등 의뢰      : ’19. 1. ~ 2.

○ 장승배기로 노후관 교체공사(2차분) 발주                 : ’19. 3.

○ 장승배기로 노후관 교체공사(1차분) 중지 해제           : ’19. 5. 20.

□ 금후계획

○ 장승배기로 노후관 교체공사(1,2차분) 지속 추진         : ’19. 5. ∼12.

맑은물공급팀

노후 상수도 관세척 공사

○ 상수관 내부 이물질(피복재, 녹 등)에 의한 관말지역 수질저하

민원해소를 위한 노후 상수도 관세척 추진

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 서신동 강변로 등 3개소

○ 사업규모 : 노후관 세척(D=300∼400mm, L= 2,657m)

- 서신동 강변로 L=476m/효자동 세내로 L=1,302m/효자동 서원로 L=879m

○ 사 업 비 : 400백만원

○ 사업기간 : 2019. 1. ∼ 2019. 7.

□ 추진상황

○ 효자동 동암고 주변 세척공사 완료 L=1,289m(117백만원) : ’18.12. ∼ ’19. 5.

○ 서신동 강변로 등 3개소 실시설계 용역 추진      : ’19. 1. ∼ 2.

○ 행정절차(일상감사 등) 이행                    : ’19. 2. ∼ 3.

○ 공사 발주 및 추진                             : ’19. 4. ∼

□ 금후계획

○ 공사 완료                                     : ’19. 7월

계량기관리팀

노후 및 고장계량기 교체 사업

○ 유효기간이 만기된 노후 및 고장난 수도계량기를 지속적으로 교체하여 상수도

행정의 투명성과 신뢰성을 향상하고 수용가에 질 높은 수도서비스 제공

□ 사업개요

○ 사업대상 : 유효기간 만료 및 고장, 동파 등 계량기

○ 관련법규 : 계량에 관한 법률 시행령 제21조(검정·재검정의 유효기간)

※ 검정유효기간 : 계량기구경 50mm이하(8년), 50mm초과(6년)

○ 사 업 비 : 1,453백만원(구입비 893, 교체비 560)

□ 추진상황

○ 2019년 관내 수도계량기 교체사업(1차)          : ’19. 4. ∼ 6.

- 실적 : 3,831개(완산1,871 덕진1,960) / 187백만원(완산94 덕진93)

○ 그간 추진실적(’17 ∼ ’19년현재) : 58,140개

구    분

2017년

2018년

2019년현재

비고

합    계

26,565

20,374

11,201

유효만기

25,090

16,463

10,630

동파 및 고장

1,475

3,911

571

○ 계량기 구입 : 소형 1,710개, 대형 20개

□ 금후계획

○ 계량기 교체 공사(단가계약) : 3회/년 실시(23,000개소 교체)

- 2차 교체공사(유효만기)                  : ’19. 8월 ∼ 10월

- 3차 교체공사(유효만기 및 동파)          : ’19.12월 ∼ ’20. 3월

○ 계량기 구입                             : ’19. 8월 ∼ 10월

수질관리과  소관

□

깨끗한 수돗물 공급 및 수질검사 강화

----

20

□

국가공인 수질검사기관 효율적 운영

----

21

□

공업용 도수관 갱생 및 확장

----

22

□

상수도 노후시설 정비로 안정적 수돗물 공급

----

23

수질분석팀

깨끗한 수돗물공급 및 수질검사 강화

○ 과학적이고 체계적인 수질관리 및 시민과 함께하는 직접소통

검증정책을 통해 상수도 수질안전성 확보

□ 사업개요

○ 상수원수부터 가정 수도꼭지수까지 단계별 수질검사 강화

- 관련규정(59개 ➞ 105개 항목)보다 강화한 수질검사 시행

구  분

법 적 기 준

강 화 시 행

원   수

(상수원관리규칙 제24조)

매월 COD 등 6개항목

매분기 수은 등 31개항목

매월  37개항목

정   수

(먹는물수질기준및검사등에 관한규칙 제 4조)

매일 탁도 등 6개항목

매주 대장균 등 7개항목

매월 비소 등 59개항목

매일  6개항목 6회

매주 15개항목

매월 59개항목

분기 102개항목

수도꼭지수

(먹는물수질기준및검사등에 관한규칙 제 4조)

월 77개소

잔류염소 등 4개항목

월 100개소

잔류염소 등 4개항목

○ 세대 현장방문 수질상태 검증으로 수돗물의 안전성 확보

- 공동주택『안전한 수돗물 인증서』발급 및 안심확인제 시행

□ 추진상황

○ 용담호, 고산정수장 매월 현지 방문 시료채수 및 정밀검사(1급수, 적합)

○ 인터넷 및 유선 신청 수돗물 안심확인제 시행 : 63개소

○ 공동주택“안전한 수돗물 인증제”수돗물 전항목 검사 및 컨설팅 : 80개소

○ 상수도 수질 실시간 수질정보 홈페이지 공개 : 연중(배수지별 3개 항목)

□ 금후계획

○ 전주권 광역상수도 공급단계별(원수⇨수도꼭지수) 수질관리 지속 강화

- 원수 → 고산정수장 → 배수지(10개소) → 수도꼭지수 단계별 검증

○ 시민과 함께하는 수질검증으로 수돗물의 안전성 확보

- 매월 상가, 주택 등 방문 수돗물 안심확인제 및 안전한 수돗물인증제 시행

○ 과불화합물 등 유해성 물질 3개항목 확대 (102개➞105개)  :  ’19. 9월

수질분석팀

국가공인 수질검사기관 효율적 운영

○ 국가에서 공인한 먹는물 수질검사기관의 효율적인 운영을 통하여

수돗물의 파수꾼 역할과 대시민 행정 서비스 강화

□ 사업개요

○ 공인 검사기관 공공성 및 신뢰성 확보를 위한 분석능력 제고

-’19 환경부 분석능력 평가에서 106개 기관중 우수기관 달성

○ 먹는물 및 시민 생활속 물관리 상태 철저한 검증

- 수돗물, 약수터, 공원음수대, 수영장수, 목욕장수, 수경시설, 민방위

비상급수시설 등 안전성 조사

※ 검사장비(55종 96점), 운영인력 6명(환경연구사2, 환경3, 의료기술1)

□ 추진상황

○’19 환경부 분석능력평가 결과 우수성적 달성(환산점수 100점)

○ 관내 먹는 물 및 시민 생활속 물상태 무료 철저한 검증추진(932건)

○ 관내 및 도내·외 주민들의 유료수질검사 의뢰건 접수처리(697건)

※ 광양, 목포, 익산, 순창, 완주 등 타지역에서도 수질검사 의뢰

○ 환경부 주관 현장평가(3년주기) 완료(’19. 5월) - 적합판정

- 기본평가, 문서평가, 자료검증 등

□ 금후계획

○ 하반기 1,100여건 수질검사 의뢰 예상 시료에 대한 분석 처리

○ 안전한 물공급을 위한 현장방문 수질검사 서비스 강화

- 수돗물, 약수터, 다수인 음수대, 수경시설 등 무료 수질검증

○ 분석능력 배양을 위한 지속적인 내부연찬 및 교육이수

시설관리팀

공업용 도수관 갱생 및 확장

○  국가산단 등 산업단지 조성에 따른 공업용수 사전확보를 위한

노후도수관 갱생 및 확장

□ 사업개요

○ 위    치 : 전미취수장 〜 팔복정수장

○ 내    용 : 노후도수관 갱생 및 확장

- 갱생 : 동부대로~팔복정수장 L=1.3㎞(∅700㎜)

- 확장 : 동부대로~팔복정수장 L=1.3㎞(∅600→∅800㎜)

○ 사 업 비 : 2,470백만원 (확장 1,430 , 갱생 1,040)

○ 기    간 : 2019. 2 〜 2019. 12월

□ 추진상황

○ 전미취수장〜동부대로(L=2.5㎞중 1.8㎞) 갱생공사 완료    : ’08. ∼ ’12.

○ 전미취수장〜동부대로(L=2.5㎞) 확장공사 완료      : ’13. ∼ ’16.

○ 용역 설계서 작성 및 행정절차 이행              : ’19. 3. ∼ 4.

○ 실시설계용역 착수(현 공정 80%)                 : ’19. 5.21.

□ 문제점 및 대책

○ 도수관 2개 라인 동시 시공 불가

□ 공사 시기 조정 시행 (갱생 관로 선 시행 후 확장 관로 시행)

□ 금후계획

○ 실시설계 용역 준공                                 : ’19. 7월

○ 행정절차 이행                                      : ’19. 8월

○ 공사착공 및 준공

- 도수관 PE 갱생공사 추진                    : ’19. 9. ∼ 10월

- 도수관 확장공사 추진                      : ’19.11. ∼ 12월

시설관리팀

상수도 노후시설 정비로 안정적 수돗물 공급

○ 정기안전점검을 통한 보수·보강 시행 (배수지 10개소)

○ 사업장(정수장, 취수장, 가압장) 기계설비 수시 점검․관리

□ 사업개요

○ 대    상 : 15개 시설(정수장 1, 취수장 1, 배수지 10, 가압장 3)

○ 내    용 : 노후시설 교체 등 유지관리, 시설물안전점검 및 보수․보강

- 배수지 내부청소(2회/년) 및 노후 장비 정비 등 유지관리

- 정기안전점검 20건(정밀안전진단 2, 정밀점검 2, 정기점검 16)

※ 근거 : 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제71조

- 배수지 내진보강 2개소(송천, 서신) ※ 2016년도 정밀안전진단 결과

- 인후배수지 방수공사(3,750㎡×4지) ※ 2018년도 정밀점검 결과

○ 사 업 비 : 3,026백만원

○ 기    간 : 2019. 2 〜 2019.12월

□ 추진상황

○ 노후 상수도시설(배수지 등) 유지관리 : 17건 99백만원

○ 상반기 배수지 내부 청소 완료 : 10개소 65백만원

○ 정기안전점검 추진

- 상반기 정기점검(8개소 17백만원) 및 정밀점검(2개소 14백만원) 완료

- 정밀안전진단(2개소 88백만원) 착수(공정80%)         : ’19. 5.16.

○ 배수지 내진보강 및 방수공사 설계용역 착수(공정 75%)   : ’19. 4.22.

□ 금후계획

○ 노후 상수도시설(배수지 등) 유지관리           : 년중

○ 하반기 정수장 및 배수지 내부 청소 추진       : ’19. 9. ∼ 10월

○ 하반기 정기점검 추진                         : ’19. 9. ∼ 10월

○ 배수지 내진보강 및 내부방수공사 추진

- 실시설계 용역 준공 및 행정절차 이행         : ’19. 8월

- 공사 발주 및 추진                              : ’19. 9. ∼ 12월

하 수 과  소 관

□

생태도시 구현을 위한 하수관로 정비사업

----

25

□

농촌마을 환경개선 하수도 정비사업

----

26

□

체계적인 지하수 관리로 하수도 자주재원 확충

----

27

□

빗물이용시설 설치 지원 및 운영관리

----

28

하수시설팀

생태도시 구현을 위한 하수관로 정비사업

○ 쾌적한 생태도시 구현과 새만금 상류 수질개선에 기여하고,

오염 부하량 저감 및 불명수 감소로 하수처리 경영 합리화

□ 사업개요

○ 기    간 : 2002년 ∼ 2035년 (34년간)

○ 위    치 : 7개 처리구역 36분구, 6개 지구, 취락지역 54개 마을 등

○ 총사업비 : 870,437백만원(국비 50%, 도비 10%, 시비 35%, 기금 5%)

○ 사업규모 : 하수관로 정비 1,015㎞, 배수설비 55,720개소

□ 추진상황

○ 2018년까지 완료(56.9%, 437,808백만원) : 5개 구역, 6개 지구

- 하수관로 정비 578km, 배수설비 30,714개소

○ 2019년 계속사업(19.7%, 229,915백만원) : 중앙처리 3,10분구 등 8개 구역

- 하수관로 정비 199.9km, 배수설비 11,195개소

(단위 : km, 백만원)

사 업 명

사업규모

총투자

규모

기투자액

2019년

2020년

이후

비   고

(추진실적/계획)

총    계

255.9

254,358

77,763

10,639

165,956

계속

사업

(’14~

’22년)

중앙처리(3,10)

: 노송,금암,인후동

55.3

39,741

37,397

1,002

1,342

・공사 중(‘15.12.~‘20.3월)

・공정 72%

덕진, 중앙처리(1)

: 덕진,송천동

19.5

14,890

14,890

-

-

・공사 중(‘17.6.~‘21.5월)

・공정 37%

중앙처리(8,9,10)

: 한옥마을,공구거리

6.5

6,823

6,823

-

-

・공사 중(‘17.6.~‘21.5월)

・공정 50%

팔복처리(1,2)

: 금학천 일원

32.6

27,947

8,904

1,837

17,206

・공사착수(‘19.6월)

중앙처리(9,10)

: 전동,노송동 일원

33.6

39,380

5,249

3,200

30,931

・설계용역 중(‘19.9월 완료)

중앙처리(8)

: 중앙,풍남동

20.8

23,800

1,500

1,000

21,300

・설계용역 중(‘19.9월 완료)

화산(1,2,6,7),아중(1)

: 완산,동서학, 삼천,평화,우아동

47.2

57,377

3,000

1,000

53,377

・설계용역 중(‘19.12월 완료)

신규

(’19~

’24년)

중앙처리(6,7분구)

: 진북,중앙동

40.4

44,400

-

2,600

41,800

・설계용역 착수(‘19.6월)

□ 금후계획

○ 잔여 사업(23.4%, 202,714백만원) 추진 : ’20년 ∼ ’35년(16년간)

- 하수관로 237.1km, 배수설비 13,811개소

하수정비팀

농촌마을 환경개선 하수도 정비사업

○ 농촌마을에 오수관을 설치하여 생활오수를 깨끗이 처리함으로써

주민들의 삶의 질 향상 및 새만금 상류지역 수질개선 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2005년 ∼ 2023년 (17년간)

○ 총사업비 : 54,077백만원(국비 70%, 시비 25%, 기금 5%)

○ 사업규모 : 21개 지구(처리시설 700㎥/일, 관로 82.7km)

□ 추진상황

○ 2018년까지 완료(62%, 17,599백만원) 14개 지구

- 9개 지구(처리시설 540㎥/일, 관로 61.2km), 5개 지구 연계처리

○ 2019년 사업추진(38%, 36,478백만원) 7개 지구

- 처리시설 160㎥/일, 관로 21.5km

(단위 : 백만원)

사  업  명

사업규모

총투자

규모

기투자액

2019년

2020년

이후

비   고

(추진실적/계획)

총    계

L=48.0km

Q=160㎥/일

36,478

20,465

6,273

9,887

계속

사업

(’14~’23년)

신중지구

(호성동)

13.2km

7,366

7,366

・공사 중(‘16.3.~’19.7월)

・공정 99%

수곡지구

(우아동)

8.2km

4,915

3,848

919

148

・공사 중(‘17.3.~‘20.8월)

・공정 69%

화신지구

(조촌동)

9.6km

Q=95㎥/일

6,563

4,569

486

1,508

・공사 중(‘18.5.~‘21.5월)

・공정 60%

원동지구

(조촌동)

2.8km

2,244

2,100

291

・공사 중(‘18.5.~‘20.11월)

・공정 60%

구원지구

(조촌동)

3.2km

3,637

1,904

427

1,306

・공사 중(‘18.5.~‘20.11월)

・공정 24%

신기지구

(조촌동)

3.8km

Q=65㎥/일

4,521

339

1,429

2,753

・설계용역 중(‘19.8월 완료)

전당,

아중.용계지구

(전미, 우아동)

7.2km

7,232

339

2,721

4,172

・설계용역 중(‘19.8월 완료)

□ 금후계획

○ 신기지구, 전당,아중·용계지구 행정절차(재원협의 등) 이행 및 공사 발주

: ’19. 9. ∼ ’20. 2월

○ 계속사업 추진 완료                           :  ∼ ’23년

지하수관리팀

체계적인 지하수 관리로 하수도 자주재원 확충

○ 지하수시설에 대한 체계적인 관리 강화로 적정한 지하수 개발․

이용을 도모하고 수질오염 예방 및 물 부족 상황에 적극 대비

□ 사업개요

○ 기    간 : 2019. 1. ∼ 2019.12.

○ 세원발굴 목표액 : 400백만원

- 2018년 부과액 12,197백만원 → 2019년 부과예상액 12,597백만원

※ 6월 현재 부과액 : 6,545백만원(부과예상액의 52%)

○ 지하수시설 등록현황 (2019. 6.30일 기준)

(단위 : 개소)

총  계

생 활 용 수

농업용수

공업용수

소  계

음용수

비음용수

6,355

3,582

272

3,310

2,707

66

○ 사업내용

- 하수도사용료 부과대상 조사 및 계량기 설치․고장 여부 조사

- 미신고․허가 지하수시설 발굴 및 시설물 실태 파악

- 지하수시설 폐공, 미사용, 행불, 고장, 방치 여부 등 조사

-「전주시 지하수통합 정보관리시스템」운영 활성화

□ 추진상황

○ 지하수 공인유량계 신설 및 교체(112개소)           : ’19. 1. ∼ 6.

○ 검침곤란 시설 옥외검침시스템 유지보수(674개소)    : ’19. 1. ∼ 6.

○ 지하수시설 이용실태 현장조사(물다량사용가 478개소)     : ’19. 2. ∼ 6.

○ 지하수 보조관측망 설치운영(12개소) : 자동관측시스템 신설 4개소

□ 금후계획

○ 지하수 의심사용가·다량사용가에 대한 지속적 점검 관리

○ 공인유량계 신설·교체 및 옥외검침시스템 사후 유지관리

○「지하수통합 정보관리시스템」농촌지역 마을하수관로 GIS공간데이터       연계구축(신중지구 12개 마을)

지하수관리팀

빗물이용시설 설치 지원 및 운영관리

○ 빗물이용시설의 이용 활성화로 친환경 수자원 확보를 통한 물 순환

체계 회복 및 도심열섬․비점오염 저감 등 환경적 가치 실현

□ 시설현황

○ 빗물이용시설 구축 : 231개소(예산지원 170, 비지원 61) 20,031톤

- 공공기관 17, 교육기관 52, 공동주택 62, 일반주택 90, 기타 10

○ 설치비 지원(2010년∼2018년) : 170개소 978백만원

□ 주요사업

구   분

국비 지원사업

자체사업

비예산사업

사 업 명

빗물이용 시범마을 조성

공공시설물 빗물이용시설 설치

공동주택 등

대형 건축물

빗물이용시설 설치

(홍보·안내)

사 업 량

덕진구 권역 시범마을 1개소

(50가구)

60개소(일반용 30, 가로수용 20,

빗물분수대 10)

예    산

400백만원(국 200, 시 200)

450백만원(시 450)

□ 추진상황

○ 공동주택·대형 건축물 대용량 빗물이용시설 설치(9개소 3,141톤)

○ 시설 유지보수 사업(개보수 지원 13개소 4.9백만원)   : ’19. 5.

○ 시설 운영실태 상반기 지도점검(227개소)            : ’19. 5. ∼ 6.

○ 덕진구 빗물이용 시범마을 조성사업(팔복 새뜰마을)   : ’19. 3. ∼ 6.

- 주민설명회, 사업참여 신청접수, 사업대상지 선정, 주민협의체 구성,

마을공동체 협약체결, 설계용역 발주 및 진행

○ 공공시설물 빗물이용 설치사업                     : ’19. 3. ∼ 6.

- 사업대상지 선정, 설계용역 발주 및 진행

□ 금후계획

○ 덕진구 권역 빗물이용 시범마을 조성사업 추진     : ’19. 7. ∼ 10월

○ 공공시설물 빗물이용시설 설치사업 추진           : ’19. 7. ∼ 10월

○ 다중이용시설 탄소빗물여과장치 설치(10개소 6.8백만원) : ’19. 8. ∼ 10월

○ 시설 유지보수 사업(5백만원)                      : ’19. 9. ∼ 10월

○ 시설 운영실태 하반기 지도점검                : ’19.10. ∼ 11월

6월 기준으로 변경

셀 높이 조정

연도 누락