제362회 전주시의회 임시회 도 시 건 설 위 원 회

2019년도

주요업무 추진상황 보고

생 태 도 시 국

보  고  순  서

□	일 반 현 황		-------	1
□	부 서 별 주 요 기 능		-------	2
□	기 본 현 황		-------	3
□	주요업무 추진계획
	○	생태도시계획과	-------	8
	○	푸른도시조성과	-------	17
	○	건축과	-------	25
	○	주거복지과	-------	37
	○	신도시사업과	-------	49
	○	걷고싶은도시과	-------	57
	○	체육종합시설추진단	-------	70

일  반  현  황

□ 기  구 : 7과 30팀

													생태도시국
생태도시 계 획 과 (6팀)					푸른도시 조 성 과 (5팀)					건축과 (5팀)					주 거 복지과 (4팀)					신도시 사업과 (4팀)					걷고싶은 도 시 과 (4팀)					체육종합 시설추진단 (2팀)
생태도시 행 정					푸른도시계 획					광고물행정					주거복지 정 책					택지개발					도로시설					경기장이전
생태도시 계 획					푸른도시조 성					공동주택					사회주택					공공기관이 전					도로정비					전시컨벤션
생태도시 조 성					꽃도시조성					건 축					공공임대 주 택					에코시티					생태복원
토지관리					공원조성					주택재개발					해피하우스					항공대이전					하천관리
공간정보					산림관리					하도급관리
도로명주소

□ 정‧현원

과 별		총계	일 반 직						임기
			4급	5급	6급	7급	8급	9급
계	정원	116	1	7	30	37	29	12
	현원	123	1	8	33	51	17	8	5
생태도시계획과	정원	23	1	1	6	8	4	3
	현원	24	1	2(파견1)	6	11	2	2
푸른도시조성과	정원	19		1	5	9	3	1
	현원	19		1	4	8	3	2	1
건 축 과	정원	21		1	5	4	9	2
	현원	24		1	10(파견2)	9	2	1	1
주거복지과	정원	13		1	4	5	1	2
	현원	16		1	4	5	2	1	3
신도시사업과	정원	17		1	4	3	5	4
	현원	17		1	4	6	5	1
걷고싶은도시과	정원	16		1	4	6	5
	현원	15		1	3	8	2	1
체육종합시설 추 진 단	정원	7		1	2	2	2
	현원	8		1	2	4 (근무배치1)	1 (근무배치1)

부서별 주요기능

과 별	분 장 사 무
생태도시 계 획 과	○ 전문건설업 등록 관리, 장기미집행 도시계획시설 매수청구 ○ 지속가능한 생태도시 종합계획 ○ 도시기본계획수립 및 관리계획결정, 도시계획사업 시행인가 ○ 지적업무 총괄, 공시지가, 부동산중개업 지도‧감독 ○ 공간정보시스템 운영 및 연계사업 관리, DB관리 ○ 도로명주소 홍보 및 부여사업, 시설물 관리
푸른도시 조 성 과	○ 도시녹화사업의 종합계획수립 ○ 가로수 식재계획 수립 및 녹지시설물 관리 ○ 국토공원화사업 ○ 공원조성계획 수립 및 조성 ○ 양묘장 관리 및 호동골자연생태체험학습원 조성 ○ 산림사업 및 산불방지 대책 업무
건 축 과	○ 옥외광고물 관리 및 정비 ○ 주택건설사업계획승인, 사용검사, 입주자 모집 승인 ○ 건축허가 및 사용승인, 건축심의 ○ 공공건축물 신축, 도시주거환경개선 ○ 주택재개발‧재건축 정비사업 ○ 지역건설업체 활성화 추진
주거복지과	○ 전주형 주거복지 기본계획 운영, 저소득층 주거급여 지원 ○ 전주형 사회주택 공급, 저소득층 노후주택 개‧보수 사업 ○ 저소득층 임대보증금 지원, 빈집 정비사업 추진 ○ 해피하우스 센터운영 및 사업 추진
신 도 시 사 업 과	○ 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립 ○ 택지개발사업 계획 및 공사 ○ 도시개발사업완료지구 유지관리 ○ 혁신도시 유지관리 및 정주여건 개선 ○ 부대이전 및 부지개발 ○ 교도소 이전사업 등
걷고싶은 도 시 과	○ 국‧공유재산(도로)관리 및 용도폐지 ○ 신규 도로개설 및 용지보상, 도시가로망 확충 ○ 국도 및 고속도로 지원 ○ 도로유지관리, 도로안내표지판 설치 및 관리 ○ 도로포장 보수지도, 가로등 관리 ○ 생태하천 복원사업 및 하천공사
체육종합시설 추 진 단	○ 전주 육상경기장 증축 및 야구장 건립 ○ 전시‧컨벤션센터 건립 ○ 전주 종합경기장 부지재생사업 추진

기  본  현  황

□ 도시계획 연혁

년 월 일	고 시 청	번 호	계획면적 (㎢)	목표 년도	계획인구	주 요 내 용
1938. 5. 9	조선총독부	403	19.76	1948	100,000	도시계획구역 결정(1차)
1966. 2.10	국토해양부	2,188	108.71	1983	550,000	도시계획 재정비(2차)
1970. 4.14	〃	178	157.22	1986	500,000	도시계획 재정비(3차)
1973. 6.27	〃	258	313.20			개발제한구역 216.4㎢ 지정
1974. 8.14	〃	272	313.20			도시계획 재정비(4차)
1976. 3.27	〃	37	313.20			도시계획 재정비(5차)
1986. 5. 8	〃	206	313.20	1991	610,000	도시계획 재정비(6차)
1995. 6.29	전라북도	112	313.20	2001	860,000	도시계획 재정비(7차)
2003. 6.26	국토해양부	161	302.67			개발제한구역 225.4㎢해제
2005. 7.29	전라북도	186	313.18	2010	748,000	도시계획 재정비(8차)
2015. 8.28	전주시	112	206.28	2020	769,000	도시계획 재정비(9차)

□ 도시지역(4개 용도지역) 197.63㎢ (전주시면적 : 206.28㎢)

구분	주 거 지 역				상업 지역	공 업 지 역				녹 지 지 역
	계	전용주거	일 반 주 거	준 주거		계	전용공업	일반 공업	준 공업	계	생산 녹지	자연 녹지	보전 녹지
면적	35.23	0.30	33.96	0.97	4.50	6.57	1.44	4.28	0.85	151.33	24.78	75.56	50.99
비율 (%)	17.8	0.1	17.2	0.5	2.3	3.3	0.7	2.2	0.4	76.6	12.6	38.2	25.8

※ 비도시지역 8.65㎢(관리지역 2.76㎢, 농림지역 5.62㎢, 자연환경보전 0.27㎢)

□ 용도지구 ------------------------------- 7개지구 19.5㎢

지 구 명	개 소 수	면 적(㎡)	비 고
고 도	24	8,003,575	역사도심 4개소 반영 (35,217) 최저고도 3개소 삭제
방 화	21	4,075,560
시가지경관	84	3,317,029	재정비조서와 일치 명칭변경(미관→시가지경관)
자연취락	157	3,332,476	여실지구 반영(26,688) (월드컵경기장 해제지역)
자연경관	8	512,447	명칭변경(경관→자연경관 )
특정용도제한지구	1	249,000	명칭변경(시설보호→특정용도제한지구)
보 호	2	6,179	명칭변경(보존→보호)

□ 토    지                                     (단위 : ㎢)

구분	합 계		대 지			임 야			기 타
	필지수	면적	필지수	면적	비율	필지수	면적	비율	필지수	면적	비율
계	193,071	206.1	77,272	32.3	15.7	10,559	66.4	32.2	105,240	107.4	52.1

□ 공원 분포현황

구분	전주시 전체		공 원 면 적			공 원 결정율 (C/A)	1인당 공원면적
	면적(A)	인구(B)	결정(C)	조성(D)	조성율 (D/C)		결 정 (C/B)	조 성 (D/B)
계	206.28㎢	654천명	22.19㎢	5.53㎢	24.92%	10.76%	33.93㎡	8.45㎡

□ 공원현황                              (단위 : 개소, ㎡)

공원의 종 류		공 원 수			공 원 면 적			비고
		계	완산	덕진	계	조 성	미 조성
계		250	142	108	22,186,573.3	5,527,526.6	16,659,046.7
도립공원		1	1		5,608,490	939,069	4,669,421	모악산
도시공원 총계		249	141	108	16,577,875.0	4,588,457.6	11,989,417.4
생활권공원	소 계	240	136	104	14,189,632.1	4,025,408.6	10,164,015.2
	근 린 공 원	61	34	27	13,849,479.8	3,730,725.5	10,118,754.3
	어린이공원	138	82	56	304,366.8	280,625.8	23,741
	소 공 원	41	20	21	35,785.5	14,057.3	21,728.2
주제공원	소 계	9	5	4	2,388,451.2	563,049.0	1,825,402.2
	역사공원	2	2		1,680,110	80,740.8	1,599,369.2	산성, 중앙
	문화공원	4	2	2	40,230.9	8,969.9	31,261.0	태평,곰솔나무,팔복,만성문화
	수변공원	2		2	246,808.3	246,808.3		기지제, 만성수변
	묘지공원	1	1		421,320	421,320
	체육공원	-	-		-	-	-

□ 공원시설물 현황                                (단위 : 개)

합 계	편의시설	운동시설	화장실	어린이 놀이시설	공원등	보안시설 (CCTV)	비 고
15,412	6,583	2,386	77	642	5,326	398

□ 가로수 식재현황                           (단위:그루)

구분 노선수	합계	느티 나무	은행 나무	벚나무	이팝 나무	단풍 나무	회화 나무	낙우송	기타
285	63,713	16,679	12,063	6,782	8,386	5,748	1,318	1,733	11,004

□ 보호수 및 노거수 현황                         (단위:그루)

구 분	계	느티나무	왕버들	은행나무	팽나무	회화나무	참죽나무	주엽나무
보호수	26	9	7	7	1	1	1
노거수	74	26	27	2	16	2		1

□ 소유별 임야면적                                 (단위:㏊)

총 계	사유림	국유림	공유림	비 고
6,249	5,415	677	157

□ 보전산지 현황                                   (단위:㏊)

계	보전녹지	자연공원	문 화 재 보호구역	조 수 보호구역	사찰림	사방지	비고
4,460	3,760	623	25	23	28	1

□ 주    택                                      (단위 : 세대)

구 분	계	단독주택	다세대주택 동당660㎡미만	연립주택 (4층이하)	아파트 (5층이상)	일 반 가구수	주 택 보급율
주택수	304,746	121,657	3,141	4,754	175,194	270,418	112.7%
비율(%)	100	39.9	1.0	1.6	57.5

□ 도시․주거환경정비 예정지구 현황

방 식	개소수	면 적 (㎢)	세 대 수
			계	현 재	증 가
계	43	2.79	32,901	16,950	15,951
주택재개발	14	1.44	15,618	5,953	9,665
주택재건축	15	0.48	9,804	6,762	3,042
주거환경개선	14	0.87	7,479	4,235	3,244

□ 광고업 등록 및 옥외광고물 현황

광고업자 등록현황 (명)	옥외광고물 (개)	시 지정 광고시설(개소)
		계	게시대	벽보판	육교 현수막	비 고
350	31,792	247	159	85	3	전주시 시설관리공단 운영 (’19. 10. 31까지)

□ 도    로                                      (단위 : 개소, ㎞)

구 분	계		고속국도		일반국도		지 방 도		시 도
	노선	연장	노선	연장	노선	연장	노선	연장	노선	연장
총연장	2,745	837	2	13	5	35	2	15	2,736	774
포장도	2,745	837	2	13	5	35	2	15	2,736	774
포장율 (%)		100		100		100		100		100

※ 도로율 : 8.17%(도로면적/시가지면적)

□ 교량 및 기타시설물                                (단위 : 개)

구분 계	교 량					육교	지하 보도	지하차도	터널	언더 패스	비고
	소계	고속 국도	일반 국도	지방도	시도
155	117		22	4	91	10	6	5	2	15

※ 장대교량 (삼례교 : 570m, 회포대교 : 707m)

□ 하천현황                                          (단위 : ㎞)

구 분		개소	하천연장	제 방 연 장			개수율 (%)	비고
				계	기개수	미개수
계		32	116.3	201.7	144.7	57.0	71.7
법정하천	소 계	20	99.6	168.3	138.3	30.0	82.2
	국가하천	3	18.2	32.2	32.2	-	100.0
	지방하천	17	81.4	136.1	106.1	30.0	78.0
소 하 천		12	16.7	33.4	6.4	27.0	19.2

□ 택지개발 현황

구 분	계		완 료		추 진 중
	개소수	면 적(㎡)	개소수	면 적(㎡)	개소수	면 적(㎡)
합 계	30	23,136,255	28	20,474,442	2	2,661,813
구획정리	12	6,819,077	12	6,819,077	-	-
택지개발	13	6,342,924	13	6,342,924	-	-
도시개발	5	9,974,254	3	7,312,441	2	2,661,813

□ 도로명 현황                                        (단위 : 개)

구분	계	대로	로	길	비고
도로명수	1,209	3	205	1,001

□ 도로명주소 안내시설                                (단위 : 개)

구분	합계	도로명판	기초번호판	국가지점 번호판	지역안내판	건물번호판
시설물	76,513	10,851	2,070	219	69	63,304

생태도시계획과  소 관

□	전주 도시관리계획 재정비	----	9
□	서학동 예술마을 지구단위계획 수립	----	10
□	지속가능한 생태도시 종합계획 세부실천계획	----	11
□	장기미집행 도시계획시설 대지보상	----	12
□	2019년도 개별공시지가 조사	----	13
□	지적재조사 사업	----	14
□	전주시 공간정보시스템(GIS) 고도화 사업	----	15
□	도로명주소 안정적 정착을 위한 내실화 강화	----	16

생태도시계획팀

전주 도시관리계획 재정비

매5년마다 도시관리계획을 재검토하여 도시기본계획의 장기적인 발전방향을 공간에 구체화하여 실현가능하도록 하는 법정 계획임

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 행정구역 전역(205.49㎢)

○ 과업기간 : 2018. 4.∼2020. 10.

○ 용 역 비 : 2,512백만원 (재정비 2,113,  교평 183,  전략환경 216)

○ 과업내용

- 용도지역‧지구‧구역의 재정비, - 지구단위계획 재정비

- 기반시설의 타당성, 관리방안 및 집행계획 재검토

- 장기미집행 도시계획시설 일몰제 대비 도시관리계획 수립 등

□ 추진상황

○ 용역착수 및 기초조사 실시	: ’18.  4.∼ 8.

○ 장기미집행 도시계획시설 단계별 집행계획 공고	: ’18. 11.∼12.

○ 용도지역‧지구, 지구단위계획 검토	: ’18.  8.∼’19.  7.

- 도시계획시설 : 전주 수목원 진입도로 결정 (고시완료 ’19. 2.)

- 역사도심 지구단위계획 변경 (입안 추진 중 ’19. 3.)

- 장기미집행시설(공원, 도로) 일몰제 대비 추진방안 수립 (’19. 5.)

○ 용도지역‧지구‧구역, 도시계획시설 정비기준(안) 작성	: ’19.  3.∼

○ (시가화, 역사문화) 경관지구 지정에 따른 도시계획조례 개정 고시 : ’19.  4.

○ 팔복동 공업지역 지구단위계획 수립 고시	: ’19.  7.

○ 경관지구, 고도지구 정비(안) 작성 중	: ’19.  5.∼8.

□ 금후계획

○ 서학동 예술마을 지구단위계획 수립 고시	: ’20.  5.

○ 장기미집행 도시계획시설 관리방안 수립	: ’20.  6.

○ 용도지역‧지구, 지구단위계획, 기반시설 전면 정비	: ’20. 10.

생태도시계획팀

서학동 예술마을 지구단위계획 수립

○ 서학동 예술마을은 전주한옥마을, 전주교대, 국립무형유산원 등이 인접하는 다양한 예술인들의 거주 지역으로써,

○ 도시재생사업의 원활한 추진을 위하여「서학동 예술마을 도시재생활성화계획(’18. 12.)」과 부합되는 도시공간의 체계적 관리 방안을 마련

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 서서학동 및 동서학동 일원(211,800㎡, 6.4만평)

○ 과업기간 : 2019. 3.∼2020. 5.

○ 용도지역/지구 : 제1종일반주거지역, 고도지구(5층 이하)

○ 주요내용 : 지구단위계획구역 지정 및 계획수립

- 건축물용도, 건폐율, 용적률, 높이, 기반시설 및 경관 등에 관한 사항

□ 추진상황

○ 용역착수(도시관리계획 재정비 용역 포함) 및 자료수집	: ’19. 3.

○ 기초조사 현황분석 및 관리방향 설정	: ’19. 4.

○ 타 지역 사례조사 및 주민의견 수렴	: ’19. 6.∼7.

- 도시재생활성화지역 : 서울 성수동, 문래동 문래창작촌 등

□ 주요 검토내용

○ 중점검토사항 : 예술인마을 특화, 정주환경 정비, 상업기능 보완

○ 관리방향

- 문화예술기능 활성화, 무분별한 난개발 방지, 주거지의 체계적 관리를 위한 건축물용도 관리

- 건축 및 가로 시설물 경관관리 기준 마련

- 안전하고 친환경적인 생활권 조성(기반시설 및 보행환경개선 확충)

- 특색 있는 도시공간 구축을 위한 공공사업 및 민간사업 시행지침 제시

□ 금후계획

○ 지구단위계획(안) 작성	: ’19.  8.

○ 전문가 자문 및 관계부서 협의	: ’19.  8.∼11.

○ 도시관리계획(지구단위계획) 입안 보고	: ’19. 12.

○ 주민의견 청취 및 관계부서 협의	: ’20.  1.

○ 관계부서 협의(전략환경 및 교통영향평가 심의 등)	: ’20.  2.∼3.

○ 도시건축공동위원회 심의 및 지구단위계획 결정 고시	: ’20.  4.∼5.

생태도시조성팀

지속가능한 생태도시 종합계획 세부실천계획

○ 생태도시 종합계획에 따른 5대 목표와 61개 세부실천계획 본격 추진

○ 생태도시 주요사업 확대 발굴 및 분기별 추진사항 점검

□ 단계별 추진 전략

○ 1단계(준비단계) : 2016년 - 2017년

- 조직구성, 조례제정, 시민홍보 및 참여(역량강화), 우선 및 시범사업 진행

○ 2단계(기반구축단계) : 2018년 - 2020년

- 생태도시 근간사업 및 시민과 함께하는 사업 추진

○ 3단계(확산단계) : 2021년 - 2025년

- 생태도시 관련 사업 본격화(파급효과가 큰 사업 우선) 및 정기적 평가(피드백)

□ 추진상황

○「전주시 생태도시 종합계획 수립 및 운영에 관한 조례」제정	: ’17. 7. 14.

○「전주시 생태도시 종합계획 수립 및 운영에 관한 조례시행규칙」제정	: ’18. 4. 13.

○「전주시 생태도시 종합계획 수립 및 운영에 관한 지침」제정	: ’18. 7. 13.

【 주요 추진실적 】

○ 분기별 추진사항 점검 : 20개 부서, 12회

○ 분기별 생태도시 주요사업 선정 및 홍보 : 9회, 13건

○ 생태도시위원회 운영 : 4회

○ 각종 사업계획시 저영향개발(LID) 기법 협의 반영 : 60개소 102건

○ 민간 신축 건축물(연면적 500㎡이상) 신재생에너지 이용 권고 : 764건

○ 신규시가지 지구단위계획 수립시 생태적 측면 고려 시행

⇒ 에코시티, 효천, 만성지구 : 공동주택 생태면적율 31%이상 확보, 식생수로 등

□ 금후계획

○ 생태도시위원회 (분과위원회 포함) 운영(수시)

○ 생태도시 주요사업 발굴 및 분기별 추진사항 점검

- 사업부서와 생태도시 기술요소 적용관련 협의 및 주기적 점검 이행

생태도시행정팀

장기미집행 도시계획시설 대지보상

장기미집행 된 도시계획시설 사업으로 인한 시민들의 사유재산권 침해 최소화 및 재산권 보호 추진

□ 사업개요

○ 근거법령 : 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제47조(도시계획시설 부지의 매수청구) 동법 시행령 제41조(도시계획시설부지의 매수청구)

○ 사업대상 : 10년이상 장기미집행 된 도시계획시설에 편입된 대지 및 대지에 있는 건축물

* 전체현황(대지) : 4,397건 / 287,103㎡ / 364,490백만원(추정)

○ 신청방법 : 시청방문 신청서 작성 접수(연중)

○ 처리절차 : 매수청구신청(신청인) → 매수여부 결정(사업부서 검토)
→ 매수결정(보상실시) → 보상완료(소유권 이전)

○ 처리기간 : 매수결정 통보일로부터 2년 이내

○ 사 업 비 : 500백만원

□ 추진상황

○ 2019년 매수청구현황 : 총3건(진행중)

○ 매수청구 처리 현황(2002.∼2019. 6.)

구 분	매수청구	매 수	취소 등	진행중
필 지(건)	277	166	108	3
면 적(㎡)	87,825	31,694	55,812	319
보상액(백만원)	33,153	23,335	9,795	23 (추정가격)

□ 금후계획

○ 대지보상 매수청구 지속홍보 실시

○ 매수청구 신청부지 보상사업 지속 추진

토지관리팀

2019년도 개별공시지가 조사

○ 정확한 토지 특성조사와 지가 산정을 통한 지가 공신력 제고 및 재산권 보호

○ 토지관련 국세‧지방세 및 각종 부담금 부과기준으로 활용

□ 사업개요

○ 근거법률 : 부동산 가격공시에 관한 법률

○ 대상필지 : 140,921필지(표준지 3,468필지)

- 사유지 : 125,255필지, 국‧공유지 : 15,666필지

○ 조사기준일 : 1. 1. 기준 공시지가 ⇒  5. 31일 결정‧공시

□ 추진상황

○ 개별공시지가 토지특성조사	: ’18. 11. 20.∼’19. 2. 8.

○ 표준지 공시지가 평가가격 심의	: ’19.  1. 10.

○ 개별공시지가 산정 및 검증	: ’19.  2. 11.∼4. 12.

○ 개별공시지가 열람 및 의견제출	: ’19.  4. 15.∼5. 07.

○ 의견제출 필지 지가 검증	: ’19.  5.  8.∼5. 10.

○ 부동산가격공시위원회 심의	: ’19.  5. 15.

	의견제출 필 지 수	수 용		기 각
		상 향	하 향
완산구	22	1	2	19
덕진구	24	3	3	18
합 계	46	4	5	37

○ 지가 결정‧공시 [1. 1일자]	: ’19.  5. 31.

○ 이의신청	: ’19.  5. 31.∼7.  1.

○ 이의신청 접수‧처리	: ’19.  7.  3.∼7. 26.

□ 금후계획

○ 부동산가격공시위원회 심의	: ’19.  7. 26.

○ 토지이동(분할‧합병‧지목변경 등)분 지가조사‧결정	: ∼12. 27.

	< 감정평가사 현장 설명제 >
※ 의견제출‧이의신청 지가 처리기간 중 전문 감정평가사로부터 현장에서 지가산정에 대한 설명으로 소통행정 강화 및 공시지가에 대한 신뢰도 제고

토지관리팀

지적재조사 사업

토지의 현실경계와 지적공부 경계 간의 불부합 정비 및 종이 지적을   디지털 지적으로 구축하기 위해 2030년까지 국가사업으로 추진

□ 지적공부 등록사항과 실제현황이 달라 주민불편이 많은 지역 우선 실시

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2013∼2030년 (18개년)

○ 사업대상 : 불부합지 66,077필지(23.7㎢) / 전체 193.071필지의 34.2%

○ 총사업비 : 8,200백만원

- ’19년 사업비 : 320백만원 (측량비)

구 분	사 업 지 구		필지수	면적(㎡)	토지소유자
2017년	완산	모과‧석산지구(삼천동3가 6-7 일원)	411필	236천	177명
	덕진	용정1지구(용정동 96-5 일원)	437필	196천	176명
2018년	완산	서서학지구(서석학동 189-39 일원) 물왕멀지구(중노송동 399-44 일원)	666필	95천	371명
	덕진	어은지구(진북동 947-1 일원)	678필	96천	312명
2019년	완산	동완산지구(동완산동 369 일원)	706필	113천	321명
	덕진	여의지구(여의동 530-4 일원)	768필	598천	451명

○ 사업지구 : 7개지구 [3,666필지 / 1,334천㎡]

※ 연도별 3개년으로 사업 추진

○ 완료 사업지구 : 8개지구 [2,348필지 / 914천㎡]

□ 추진상황

○ (’18년 사업지) 경계 결정 및 대장 작성	: ∼’19. 12.

○ (’19년 사업지) 지구지정 고시	: ’19. 2. 28.

○ (’19년 사업지) 측량‧조사 대행자 선정 및 측량 시행	: ∼’19. 10.

□ 금후계획

○ (’19년 사업지) 경계 조정 및 의견수렴	: ’19. 10.∼

○ (’18년 사업지) 경계 확정 및 조정금 부과‧지급	: ’20.  1.∼

공간정보팀

전주시 공간정보시스템(GIS) 고도화 사업

공간 빅데이터 분석 등 행정업무 환경 변화에 대응할 수 있도록 노후화된 공간정보 시스템을 개선하여 공간정보기반의 통합 행정체계 마련 및 민원서비스의 질 향상

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018. 3.∼2019. 8.

○ 사 업 비 : 289백만원(시비)

○ 사업내용

- 노후서버 장비 교체 및 사용자 중심의 시스템 환경 구성

- 대민서비스 제공을 위한 개방적 공간정보 사이트 개설

- 전주지역 연도별 항공사진 열람(1966∼2018) 및 3차원 지도 서비스 제공

- 워크넷을 연동한 스마트 일자리 서비스 제공

□ 추진상황

○ 공간정보시스템 고도화 사업 용역 추진	: ’18.  3.

○ 최신 GIS기술 도입을 통한 정확한 위치기반 행정서비스 제공 : ’18. 12.

○ 대민서비스 제공을 위하여 워크넷 연계 추진	: ’19.  3.

○ 공간정보 분석기능 개발 및 웹편집시스템 구축	: ’19.  6.

※ 공간정보시스템(GIS)운영 현황 : 2008년 구축/ 권한부여자수 : 1,375명(직원)

- 총 187종의 지하시설물, 도로·도시기반시설 및 도시계획선, 전자도면 운영·관리

□ 금후계획

○ 대민서비스 생활지도 포털 구축	: ’19.  7.

○ 공간정보시스템 온라인 대민서비스 제공	: ’19.  8.

○ 공간정보시스템 사용에 따른 만족도 조사	: ’19. 11.

도로명주소팀

도로명주소 안정적 정착을 위한 내실화 강화

도로명주소 활용도가 늘어나고 있음에 따라 도로명주소 원리 이해  교육을 통한 시민생활 편의 제고 및 인프라 확충으로 내실화 강화

□ 사업개요

○ 활용 인프라 확충 : 안내시설물의 확충 [도로명판, 기초번호판, 국가지점번호판]

※ 전주시관리 : 도로명판, 기초번호판, 국가지점번호판, 지역안내판 / 소유자관리 : 건물번호판

○ 사용자 중심 맞춤형 홍보 : 대상 그룹별 맞춤형 현장교육 및 이벤트 추진

□ 추진상황

○ 안내시설물 확충 : 1,044개소

- 도로명판(보행자용) 911 / 기초번호판 88 / 국가지점번호판 45

□ 보행자 중심 및 재난위험지역에 시설물 설치로 위치 찾기 및 신속한 긴급 구조 위치 파악 가능해짐

○ 안내시설물 일제조사 : 32,491개소

- 도로명판 5,440 / 기초번호판 1,982 / 지역안내판 69 / 건물번호판 25,000

□ 안내시설의 효율적 예방점검 및 최적상태 유지로 시민의 안전 및 위치 찾기 편의 제공

○ 상세주소 부여 확대 추진

- 전입신고 원스톱 처리 운영 :  94건

- 직권부여에 따른 부여 처리 : 309건

□ 원스톱 처리 시행으로 1인가구 및 노인 세대 신청부담 줄어들고 직권부여처리로 공법주소 사용증가

○ 도로명주소 원리이해 중점 홍보 추진

- 초등학생 방문교육 홍보

- 상세주소 안내 스티커 부착 및 현장 홍보

□ 우리집 및 학교 주변 주요 도로명을 알고 주소 원리 이해함으로써 위치 예측 인지 강화

□ 금후계획

○ 안내시설물 유지관리

- 도로명판 등 : 일제조사 완료(8월)에 따른 훼손‧망실분 정비

○ 생활화를 통한 시민생활 편의 제고

- 축제‧행사장 도로명주소 홍보관 운영

- 도로명 스토리텔링기반 2020년도 달력 제작

푸른도시조성과  소 관

□	전군도로 벚꽃길 복원 조성	----	18
□	도시숲 조성	----	19
□	도시 바람길 숲 조성	----	20
□	아름다운 꽃도시 조성	----	21
□	덕진공원 연화교 재가설	----	22
□	장기미집행 도시공원 관리방안 수립 용역	----	23
□	산림보호 및 숲 복지서비스 제공	----	24

푸른도시계획팀

전군도로 벚꽃길 복원 조성

번영로 벚꽃길을 복원하여 과거의 명성을 되살리고 시민들에게    휴게공간으로서의 아름다운 가로수길 제공

□ 사업개요

○ 위    치 : 국도 26호선(L=4.4Km / 반월동 지하차도∼도도동 득룡교)

○ 사업기간 : (당초) 2019. 2.∼5. ➝ (변경) 2019. 2.∼12.

○ 사 업 비 : 100백만원(국비 50, 시비 50)

○ 사업규모 : L=0.5Km(성덕동 버스정류장∼도도동), 왕벚나무 식재 138주

	〈번영로(전군도로) 벚꽃길 복원〉
□ 노 선 : L=33Km(전주∼군산) ※ 전주 4.4㎞, 군산 15.2, 익산 5.1, 김제 8.3 □ 사업기간 : 2018 ∼ 2022년 □ 수종/수량 : 벚나무 4,452주(전주 848, 군산 2,114, 익산 1,135, 김제 355) ※ 1차년도 전군도로 벚꽃길 복원사업 추진 : ’18. 2. ~ 5. - 사업규모 : L=0.5㎞, 왕벚나무 식재 141주, 초화류 식재 17,666본

□ 추진상황

○ 설계용역 추진, 공사 착공	: '19. 1.∼4. 17.

○ 왕벚나무 수목검수를 위한 관외 출장(5회)	: '19. 4.∼6.

- 검수결과 : 규격(H3.5 × B8) 상이 및 가로수 수형 미흡(임실, 제천, 원주, 청송, 삼례)

○ 왕벚나무 보유현황 파악을 위한 협조 요청(전국 시군구)	: '19. 5.  3.

○ 왕벚나무 수급 곤란으로 인한 공사 일시중지	: '19. 5. 10.

□ 문제점 및 대책

○ 왕벚나무의 원활한 생육을 위해 5월(고온 발생 전)까지 수목 식재 되어야 하나, 최근 전국적인 벚나무 수요 급증으로 가격 상승 및 수급 차질 발생

□ 벚나무 보유현황을 지속적으로 파악 및 조달, 생육기반을 고려하여 가을(11∼12월)에 식재 추진

□ 금후계획

○ 왕벚나무 보유현황 지속조사 및 현장검수	: '19.  7.∼

○ 왕벚나무 식재 등 공사완료	: '19. 11.∼12.

푸른도시조성팀

도시숲 조성

도심 곳곳 어디서나 작은 숲을 만날 수 있도록 도시 숲을 조성하여,

사람과 자연이 공존하는 지속가능한 친환경 생태도시 조성

□ 사업개요

○ 위    치 : 팔복산업단지 내 유휴지, 평화동 꽃밭정이복지관, 전주 종합리싸이클링타운, 효문여중 부근 완충녹지 등

○ 사업규모 : 23개소

○ 사업기간 : 2019. 1.∼12.

○ 총사업비 : 4,620백만원(명시이월 1,900 / 2019년 2,720)

○ 사업내용 : 도심 내 녹지량 확충 및 열섬현상 완화 등 생활환경 개선을 위한 녹색 쉼터 조성

□ 추진상황

○ 2018년도 도시숲 조성사업 추진(이월사업)	: '18. 10.∼

- 백제대로 가로숲 조성(완료)	: '19.  3. 22.

- 온고을로 가로화단, 주요도로 가로숲 조성(공정률 60%)	: '19.  4.∼

○ 2019년 도시숲 조성사업 계획 수립	: '19.  1.

○ 사업별 실시설계용역 추진 및 행정절차 이행	: '19.  2. 11.∼

○ 은혜요양원 나눔숲 조성(완료)	:  '19.  6. 17.

○ 덕진노인복지관벽면녹화사업 실시설계용역(발주 의뢰)	: '19.  6. 19.

□ 금후계획

○ 2019년 도시숲 조성사업 지속 추진	: '19. 7.∼12.

○ 2020년 사업 대상지 조사	: '19. 7.∼12.

푸른도시조성팀

도시 바람길 숲 조성

도시 외곽의 맑은 찬공기를 도심으로 끌어들여 대기정체 해소 및   공기순환 촉진을 통한 열섬현상 완화와 미세먼지 저감으로 쾌적하고  살기 좋은 생활환경 조성

□ 사업개요

○ 위    치 : 백제대로, 백제대로와 교차도로 일원

○ 사업규모 : 20ha

○ 사업기간 : 2019. 1.∼2021. 12.(3년)

○ 총사업비 : 20,000백만원(국비 10,000, 시비 10,000)

○ 사업내용 : 도심열섬현상 완화 및 미세먼지 저감 등을 위한 도시 바람길숲 조성

바람생성숲		디딤숲·확산숲		연결숲		도시내 맑은 공기순환
(도시외곽 산림)		(도시내 거점숲)		(바람생성숲,거점숲 연결)
조림·숲가꾸기 등		도시 거점숲, 옥상·벽면 등 녹화		하천, 가로수 병렬식재 등 녹지축 연결

□ 추진상황

○ 2019년「도시 바람길 숲」조성 시범사업에 대한 산림청 협의(3회)  : '18. 3 ‧ 5 ‧ 9.

○ 지방재정영향 평가 및 중기지방재정계획 반영        : '18. 10.

○ 2019년「도시 바람길 숲」조성 시범사업 선정(산림청)   : '18. 11.

○ 중기지방재정계획 및 지방재정 투자 심사(중앙심사)  : '18. 12.∼'19. 3.

○ 전주시 도시 바람길숲 조성 계획 수립	: '19.  2.

○ 용역 발주방법 사전 컨설팅감사(전라북도)	: '19.  3.∼4.

○ 기본 및 실시설계용역 일상감사 및 원가심사    : '19.  5.∼6.

□ 금후계획

○ 기본 설계 및 실시설계용역	: '19. 7.∼'20. 6.

- 기관 ․ 단체 ․ 상가 ․ 아파트 등과 협의, 주민 의견 수렴 및 행정절차 이행 등

○ 도시 바람길 숲 조성사업 추진	: '20. 6.∼'21. 12.

꽃도시조성팀

아름다운 꽃도시 조성

○ 꽃의 다양한 색감과 향기 등을 이용한 거리 풍경 연출로 오감만족 꽃도시 조성

○ 시민 및 관광객들에게 아름다운 볼거리 및 편안한 녹색 쉼터 제공

□ 사업개요

○ 위    치 : 한옥마을, 팔달로 등 주요 도로변

○ 사업규모

- 계절꽃 생산 : 200만본(전통 초화류 포함)

- 꽃거리 조성 : 도심화단 11개소, 대형화분 1,875개, 난간화분 1개소 등

- 꽃재배하우스  : 23동(2연동 7, 단동 9)

○ 사 업 비 : 887백만원

○ 사업내용 : 꽃과 어우러진 밝고 화사한 거리 풍경 연출

□ 추진상황

○ 아름다운 꽃도시 조성(2회 / 봄‧초여름)	: '19. 2.∼6.

- 계절꽃 생산 및 식재 84만본(팬지, 일일초, 메리골드 등 19종)

○ 전주국제영화제 등 문화행사 대비 꽃거리조성	: '19. 3.∼6.

○ 자연생태체험학습원 힐링 꽃누리 조성	: '19. 3.∼6.

- 계절별 테마식물 식재 및 관리 : 15,000㎡(수레국화, 금계국, 꽃양귀비 등)

○ 꽃 생산용 자동화 시설 확충(2연동 1식)	: '19. 4.∼6.

○ 양묘장 꽃과 접목한 자연체험 프로그램 운영(1,110명 참여)	: '19. 4.∼6.

□ 금후계획

○ 아름다운 꽃거리 조성 3회(여름, 가을, 겨울)	: '19. 7.∼12.

- 계절꽃 수량 및 종류 : 116만본(페츄니아, 국화, 호밀 등 26종)

- 주민참여 꽃거리조성 2개소(전북대대학로, 한옥마을)

○『호동골 허수아비 자연놀이터』행사 추진           : '19. 9.

○ 시민과 함께하는 계절별 자연체험 프로그램 운영	: '19. 9.∼11.

-『꽃과의 어울림, 자연놀이터』운영(매주 3회)

○ 가드닝 작품전시 및 꽃(자연)과 관련된 프로그램 운영	: '19. 10.

공원조성팀

덕진공원 연화교 재가설

덕진공원 내 노후된 연화교를 전주 이미지에 맞는 전통양식의 디자인‧

구조‧형식으로 재가설하여 안전성 확보 및 관광 명소화 도모

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진공원 연못 내

○ 사업규모 : 인도교 L=263m, B=3.3m

○ 사업기간 : 2017∼2020년 (4개년)

○ 사 업 비 : 6,000백만원(도비 1,165 / 시비 4,835)

- 예산확보 : 총4,644백만원[도비1,165 / 시비3,479(지방채2,000 / 특교세400)]

＊ 2019년 1회 추경 1,356백만원 요청

○ 사업내용 : 기존 연화교 철거 및 재가설 1식

□ 추진상황

○ 연화교 디자인(안) 보고 및 경관위원회자문	: '17.  2. 28.

○ 디자인, 구조, 형식 등 확정	: '17. 11.  7.

○ 경관위원회 심의(경간폭,인도폭,난간고 등 제고)	: '17. 12. 20.

○ 행정절차 이행(일상감사, 설계자문위원회, 원가심사) 등	: '18.   4.∼7.

○ 연화교 전면통제	: '18. 11. 16.

○ 연화교 재가설 공사(전체분/1차분) 착공	: '18. 11. 28.

○ 통합 건설사업관리 용역 착수(금학천&연화교)	: '18. 11. 28.

○ 연화교 가도설치 및 기존 교량 철거	: '19.  3. 13.

○ 연화교 재가설 공사 일시중지	: '19.  3. 29.

□ 문제점 및 대책

○ 제2차 대표관광지 육성사업 기본계획에 의한 덕진연못 전통공원화 및 연화정 재건축 계획과 병행‧연계조화를 위한 설계변경 필요

□ 전문가 자문 및 경관ㆍ도시공원위원회 심의를 통한 변경계획 확정

□ 금후계획

○ 연화교 재가설 공사 재착공	: '19. 7.

○ 연화교 재가설 공사 준공	: '20. 3.

공원조성팀

장기미집행 도시공원 관리방안 수립 용역

2020년 7월 장기미집행 시설(도시공원)의 일몰제에 대비하여 우선 관리지역 선별 후 공원별 계획적 관리방안을 수립하여 난개발 방지

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 관내 도시공원

○ 과업내용 : 실효 대상 15개 공원 관리방안 및 집행계획수립

○ 용역기간 : 2018∼2019년 (2년)

○ 용 역 비 : 300백만원

□ 추진상황

○ 장기미집행 도시공원 관리방안 수립용역 착수	: '18.  5.

○ 개발여건 분석 및 현장조사	: '18.  8.∼12.

○ 시민‧환경단체, 전문가 간담회 개최(2회)	: '19. 2. 4. / 3. 5.

○ 시의회 도시건설위원회 간담회 개최(2회)	: '19. 2. 20. / 4. 15.

○ 전주시 장기미집행 도시공원 대책 협의회 개최(2회)	: '19. 5. 10. / 6. 27.

○ 일몰제 대비 도시공원 관리계획 수립	: '19.  5. 31.

○ 장기미집행 도시공원 실시계획인가 용역발주	: '19.  6. 25.

□ 금후계획

○ 장기미집행 도시공원 대책 협의회(거버넌스) 지속 운영   : '19.  7.∼

- 공원‧토지별 우선보상대상지역 기준마련 및 우선순위 선정 등

○ 각종 제영향평가(교통ㆍ환경ㆍ재해ㆍ문화재 등)용역발주  : '19.  7.

- 2019년 1회 추경예산 확보 후 용역 실시

○ 공원별 우선보상대상지역 검토 / 현장조사	: '19.  7.∼10.

○ 공원조성계획 및 도시관리계획 변경	: '19. 12.

○ 장기미집행 도시공원 실시계획인가 고시	: '20.  5.

○ 공원 내 사유지 매입(우선보상대상지역 등)	: '20.  6.

산림관리팀

산림보호 및 숲 복지서비스 제공

○ 산림재해 대응체계 확립으로 산림피해를 최소화하여 소중한 산림자원 보호

○ 쾌적하고 건강한 도시산림 조성으로 다양한 숲 복지서비스 제공

□ 사업개요

○ 산림면적 : 6,249ha

○ 미세먼지저감 조림 및 풀베기 : 25ha

○ 유아숲체험원 운영‧조성 : 3개소(운영 2, 조성 중 1)

○ 산불인력 및 장비 : 감시‧진화 123명, 4,018점(진화차량, 드론 등)

○ 산림휴양 인권숲길 조성 및 등산로 유지관리사업 : 10km(학산 일원)

○ 산림병해충 방제(소나무재선충병 등) : 500ha

□ 추진상황

○ 2019년 봄철 산불방지 대책본부 운영	: '19. 1. 12. ∼5. 15.

- 산불예방 및 초동진화 체계 구축

․ 산상감시 : 25개소 25명 / 이동감시 : 17개소 17명 / 진화대 거점배치 : 87명

○ 소나무재선충병 긴급 방제사업(1km이내 / 128백만원)	: '19.  3.∼ 4.

- 모두베기 533본, 단목파쇄 31본, 그물망1,412본, 예방주사 7,384본

○ ’19년 유아숲체험원 조성 대상지 선정 및 실시설계	: '19.  2.∼ 8.

○ 산림휴양 인권숲길 조성사업 실시설계	: '19.  3.∼ 6.

○ 유아숲체험원 운영(2개소 : 인후공원, 혁신도시)	: '19.  3.∼12.

- 2019. 6월말 기준 운영현황 : 656회 / 11,240명

□ 금후계획

○ 미세먼지저감 조림 및 숲가꾸기사업 추진	: '19.  7.∼11.

○ 산림휴양 인권 숲길 및 등산로 유지관리사업 추진	: '19.  7.∼11.

○ 유아숲체험원 조성사업 추진	: '19.  8.∼12.

○ 2차 소나무재선충병 방제사업(2km이내 / 414ha)	: '19. 10.∼12.

○ 2019년 가을철 산불방지대책본부 운영(시청, 양구청)	: '19. 11.∼12.

건 축 과  소 관

□	첫 마중길 2단계 간판개선 사업	----	26
□	삼천동 막걸리골목 간판개선 사업	----	27
□	옥외광고물 관리강화로 쾌적한 도시환경조성	----	28
□	노후 공동주택 관리비용 지원 사업	----	29
□	소규모 공동주택 관리비용 지원 사업	----	30
□	2030 도시·주거환경정비기본계획 수립	----	31
□	재개발·재건축 정비 사업	----	32
□	주거지지원형 도시재생 뉴딜사업	----	33
□	3단계 도시주거환경개선 사업	----	34
	동산동 우리마을 가꾸기 사업	----	35
	지역건설업체 활성화 추진	----	36

광고물행정팀

첫 마중길 2단계 간판개선 사업

전주의 첫 관문인 전주역 앞에 첫 마중길이 조성되어 도시미관을 저해하는 간판을 정비하고 전주만의 고유특성에 맞는 간판거리 조성 및 역세권 경제활성화 도모

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019. 1.∼12.

○ 사업위치 : 한양주유소 ↔ 우아동 홈플러스 (L=500m)

○ 사 업 비 : 400백만원(국비 200, 시비 200)

○ 사업내용

- 전주역 앞 첫 마중길(L=500m) 점포 55개의 노후 간판 정비

- 노후‧불량 간판 146개 철거 및 신규간판 65개 신설

- 노후 건물 파사드(건물 외벽개선) 개선 등

□ 추진상황

○ 행정안전부 간판정비사업 공모 선정	: '18.  8.

○ 첫 마중길 간판정비시범구역 지정 고시	: '18.  9.

○ 간판개선시범사업 대상지 주민동의서 징구(80%)	: '18. 10.

○ 간판개선시범사업 실시설계 용역 발주	: '19.  3.

○ 사업추진에 따른 주민설명회 개최	: '19.  4.

○ 공공디자인위원회 디자인 심의 신청	: '19.  6.

□ 금후계획

○ 실시설계 용역 준공	: '19.  8.

○ 간판개선시범사업 공사 착수 및 준공	: '19.  9.∼

광고물행정팀

삼천동 막걸리골목 간판개선 사업

천년고도 전주시의 주요 볼거리와 먹거리 중 하나인 삼천동 막걸리 골목을 지역특성에 맞는 아름다운 간판으로 정비하여 침체된 상권활성화 및 쾌적한 가로경관 조성

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019. 1.∼12.

○ 사업위치 : 삼천동 막걸리골목(L=450m) 45개 점포

○ 사 업 비 : 300백만원(도비 80, 시비 220)

○ 사업내용

- 삼천동 막걸리골목(L= 450m, 45개 점포) 노후 간판 정비

- 노후‧불량 간판 76개 철거 및 신규간판 55개 신설

- 노후 건물 파사드(건물 외벽개선) 개선 등

□ 추진상황

○ 간판개선시범사업 대상지 주민동의서 징구(80%)	: '18.  7.

○ 전라북도 간판개선사업 공모 선정	: '18. 11.

○ 삼천동 막걸리골목 간판정비시범구역 지정 고시	: '19.  3.

○ 간판개선시범사업 실시설계 용역 발주	: '19.  3.

○ 사업추진에 따른 주민설명회 개최	: '19.  4.

○ 공공디자인위원회 디자인 심의 신청	: '19.  6.

□ 금후계획

○ 실시설계 용역 준공	: '19.  8.

○ 간판개선 시범사업 공사 착수 및 준공	: '19.  9.∼

광고물행정팀

옥외광고물 관리강화로 쾌적한 도시환경 조성

옥외광고물의 체계적이고 효율적인 관리로 불법광고물을 최소화하여 깨끗한 도시경관 개선과 선진광고문화 정착

□ 사업개요

○ 정비기간 : 연 중

○ 정비대상 : 주요도로변 등에 무단설치 된 불법유동광고물

○ 정비내용 : 현수막 등 불법 유동광고물 정비를 통한 쾌적한 도시경관 조성

□ 추진상황

○ 불법 유동광고물 정비

(’19년 6월말 기준)

정비실적(건)						행정처분(천원)
계	현수막	입간판	벽보	전단	에 어 라이트	건	이행 강제금	과태료
126,008	102,515	279	11,275	11,542	397	212 (335,148)	2건 (1,000)	210건 (334,148)

○ 토‧일‧공휴일 단속 : 전주시 옥외광고협회

○ 공공 및 정당 현수막 등 옥외광고물 설치 자제 협조요청(2회)

○ 설, 축제기간 등 취약시기별 불법광고물 일제정비 실시(4회)

○ 전주시‧경찰서 불법광고물 야간 합동 단속(1차)	: '19. 6. 20.

□ 문제점 및 대책

○ 공공목적의 공사 및 교통안내, 선거관련 등 적용배제 규정(게첩기간 30일)에 해당하는 현수막 미정비로 단속에 대한 형평성 제기 및 도심경관 훼손

□ 실명제 실시 : 시·산하기관 사업부서 및 선관위 등 공공목적 현수막 실명제 적용 단속강화

□ 금후계획

○ 공공기관, 정당‧정치인, 사회단체 등 불법 현수막 지속 단속

○ 시‧산하기관 사업부서 및 선관위 등 공공용 현수막 실명제 표시 협조요청

○ 전주시‧경찰서 불법광고물 야간 합동 단속	: '19. 7.∼12.

○ 추석 및 문화축제 등 시기별 불법광고물 일제정비 추진

공동주택팀

노후 공동주택 관리비용 지원 사업

주거환경이 열악하고 자체관리 능력이 부족한 노후 공동주택에 대해 관리비용 일부를 지원하여 주거환경개선 및 서민 주거안정 도모

□ 사업개요

○ 지원근거 : 공동주택관리법 제85조 및 전주시 주택조례 제4조

○ 사업대상 : 노후 공동주택 관리비용 지원(총 390개단지 중 63개 단지)

○ 총사업비 : 1,200백만원(도비 600, 시비 600)

○ 지 원 액 : 단지별 사업비의 70% 이하로서 2,000만원 이하 보조

○ 사업내용 : 20년 이상 노후 공동주택 부대시설 등 보수비용 일부지원

○ 사업기간 : 2019. 1.∼12.

□ 추진상황

○ 지원대상단지 홍보‧신청 및 구청 심사	: '19. 1.∼2.

○ 신청단지 실태조사	: '19. 2.

○ 공동주택지원 심사위원회 개최 및 대상단지 선정	: '19. 3.

○ '19년도 공동주택 관리 지원사업 신청(시→도)	: '19. 4.

○ '19년도 공동주택 관리 지원사업 확정 및 보조금 교부(도→시)	: '19. 5.

※ 기 지원 실적(’05∼’18년까지) : 416개단지 68,193세대 / 5,149백만원

□ 금후계획

○ 지원단지 사업시행 및 정산	: '19. 5.∼12.

건축팀

소규모 공동주택 관리비용 지원 사업

자체관리 능력이 부족한 소규모 노후 공동주택의 관리 비용의 일부 지원으로 열악한 주거환경을 개선하여 서민 주거생활 안정 도모

□ 사업개요

○ 지원근거 : 전주시 소규모 공동주택 관리에 관한 지원 조례

○ 사업대상 : 6개단지(20년 이상 경과된 5세대이상 19세대이하 공동주택)

❖ 전체현황 : 134개단지 1,430세대 (완산 52단지 504세대, 덕진 82단지 926세대)

❖ 그간실적 :  16개단지 229세대 262백만원 (’16∼’18년 )

○ 사 업 비 : 100백만원

○ 지 원 액 : 단지별 총 공사비의 80% 이하(최대 2,000만원)

○ 사업내용

- 부대시설 및 건물 외벽, 옥상 등 공용부분 보수‧보강 공사

- 석축․옹벽․절개지 등의 재난위험 해소를 위한 보수 공사

○ 사업기간 : 2019. 1.∼12.

□ 추진상황

○ 관리비용 지원 사업 신청 홍보 및 접수	: '19. 1.∼2.

○ 신청단지 현장조사 및 검토	: '19. 2.

○ 지원단지 선정(관리비용 심사위원회)	: '19. 3.

- 6개단지(완산4, 덕진2) 40세대 / 99,627천원(자부담 38,126천원)

○ 사업 추진	: '19. 4.∼6.

- '19. 6월 추진실적 : 4개소 완료(완산 2, 덕진 2)

□ 금후계획

○ 사업 추진(완산 2개소) 및 정산	: '19. 7.∼10.

주택재개발팀

2030 도시‧주거환경정비기본계획 수립

○ 기 수립된 2020 전주시 도시‧주거환경정비기본계획의 법정 재정비 주기 도래

○ 도시‧주거환경정비와 관련된 제반 관련 법규의 개정, 변경 및 여건 변화에 따라 2030 전주시 도시‧주거환경정비기본계획의 변경 수립 필요

□ 사업개요

○ 공간범위 : 전주시 도시지역 내 구 시가지 일원(13,668,000㎡)

○ 용역기간 : 2019. 6. 5.∼2020. 6. 4. (착수일로부터 12개월)

○ 용역금액 : 584백만원(도시․주거환경정비기금)

○ 법적근거 : 도시 및 주거환경정비법 제4조에 따라 10년 단위 수립

- 2020 전주시 도시 및 주거환경정비 기본계획 수립 완료 시행 중

○ 주요내용

- 전주시 특성을 고려한 정비방향 제시

- 기존 정비예정구역 존치 또는 해제와 해제지역의 종합관리계획

- 건폐율․용적률 등에 관한 건축물의 밀도계획 등

□ 추진상황

○ 2020 전주시 도시‧주거환경정비기본계획 수립 고시	: '15. 2.

○ 2030 도시‧주거환경정비기본계획 수립용역 입찰공고	: '19. 3.

○ 도시‧주거환경정비기본계획 수립용역 참가업체 사업능력평가	: '19. 4.

○ 도시‧주거환경정비기본계획 수립용역 업체 선정 및 착수	: '19. 6.

○ 기본계획 수립 관련 기초자료 수집 및 여건 분석	: '19. 6.

□ 금후계획

○ 현황조사 및 기본계획 수립	: '19.  7.∼'19. 10.

○ 전문가 의견 수렴 및 관련부서 협의	: '19. 11.∼'20.  1.

○ 주민공람 및 의회 의견청취	: '20.  2.∼'20.  3.

○ 전주시 도시계획위원회 심의	: '20.  4.

○ 도시․주거환경정비기본계획 결정 고시	: '20.  5.

○ 용역완료	: '20.  6.

주택재개발팀

재개발‧재건축 정비 사업

노후 불량주택 개량 및 정비사업 추진으로 도시기능을 회복하고 주거환경개선으로 도시환경 및 주거생활의 질을 높이고자 함

□ 사업개요

○정비(예정)구역 : 29개소(재개발 14, 재건축 15)

구 분		추진위 미구성	추진위 구 성	정비구역 지 정	조합설립 (시공사선정)	사업시행 계획인가	관리처분 /착공	공사완료
합계	29	7	5	3	4	2	4	4
재개발	14		전라중일원, 병무청, 효동,, 성황당, 동부시장	하가	종광대2, 기자촌, 동양@인근	감나무골	바구멀1, 태평1, 효자	물왕멀
재건축	15	송천롯데, 세원거성, 거성·한성·부광, 세경, 삼천쌍용2, 개나리, 송천무지개		오성대우 삼천주공3	효자주공	삼천쌍용	우아주공1	삼천주공2, 우진태하, 우아주공2

□ 추진상황

○ 재개발, 재건축정비사업 행정절차 추진	: '18. 1.∼12.

- 안전진단(세경), 정비계획입안제안(세경,전라중교일원,병무청,하가), 정비구역(변경)지정(삼천주공3,기자촌,동양@인근,삼천쌍용,효자주공,바구멀1,우아주공1), 추진위(변경)승인(전라중교일원,하가,오성대우,삼천주공3), 조합설립(변경)(삼천주공3,종광대2,기자촌,동양@인근,삼천쌍용,효자주공,감나무골,효자,우아주공1,물왕멀,우아주공2,) 사업시행(변경)(바구멀1,효자,우아주공1,물왕멀,우아주공2), 관리처분(변경)인가(바구멀1,우아주공1,물왕멀,), (준공)물왕멀,우아주공2, (이전고시‧해산)물왕멀

○ 오성대우 조합설립추진위원회 해산신고 수리	: '19. 1. 14.

○ 우아주공2 재건축정비사업 이전고시	: '19. 1. 30.

○ 재개발, 재건축정비사업 사업시행계획 변경인가

- 우아주공1('19. 3. 5), 바구멀1구역('19. 3. 14), 태평1구역('19. 4. 10)

○ 하가구역 재개발정비사업 정비계획 결정 및 정비구역 지정	: '19. 4. 19.

○ 우아주공1 재건축정비사업 입주자모집공고 승인	: '19. 4. 25.

○ 삼천쌍용 재건축정비사업 사업시행계획인가	: '19. 5. 13.

□ 금후계획

○ 사업추진 구역은 행정절차 등 민원신청 시 신속 민원처리

○ 공사 중 사업현장 지도감독 강화로 소음‧분진 등 주민피해 최소화

하도급관리팀

주거지지원형 도시재생 뉴딜사업

노후화가 가속되고 있고, 생활편의시설이 열악한 주거 밀집지에 대한 도시재생 뉴딜사업 추진으로“주민 삶의 질”개선

□ 사업개요

○ 대 상 지 : 인후/반촌 정비사업 해제구역 일부(A=91,165㎡)

○ 용 역 비 : 20백만원(도시재생과 112백만원 별도)

○ 용역기간 : 2019. 4.∼12.

○ 용역내용

- 주거지지원형 사업대상지 현황 조사

- 주거지지원형 도시재생 기본구상 및 사업계획 수립

- 인후+반촌지역 도시재생 활성화계획 수립

- 국토부 주거지지원형 도시재생 뉴딜사업 공모절차 이행

□ 추진상황

○ 용역과제 심의 이행	: '18. 10.

○ 용역 원가 일상감사 이행, 용역계약 의뢰	: '19.  3.

○ 용역 착수 및 추진	: '19.  4.∼6.

○ 도시재생대학 및 주민협의체 운영	: '19.  5.∼6.

□ 금후계획

○ 도시재생 뉴딜사업(주거지지원형) 공모 신청	: '19. 7. 30.∼8. 2.

○ (공모선정시) 도시재생 뉴딜사업 추진	: '20.∼'23.

※ 공모 선정 이후 투자계획

(단위 : 백만원)
구분	총투자 규 모	기투자	이후 투자계획					비고
		2018년까지	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년~
계	16,667	-	-	3,833	5,833	5,333	1,668
국 비	10,000	-	-	2,300	3,500	3,200	1,000
도 비	1,667			383	583	533	168
시 비	5,000	-	-	1,150	1,750	1,600	500

하도급관리팀

3단계 도시주거환경개선 사업

도시 저소득주민 집단거주, 노후‧불량건축물 과밀지역에 대해 기반시설을 정비하여 안전한 주거공간 확보와 정주여건 개선

□ 사업개요

○ 대 상 지 : 2개 구역(풍남초교 인근, 강당재)

○ 총사업비 : 66.4억원(국비 33.2, 시비 33.2)

(단위 : 백만원)
구분	총투자 규 모	기투자	이후 투자계획		비고
		2018년까지	2019년	2020년
계	6,636	6,636	-	-	이월계속사업비 2,195백만원
국 비	3,318	3,318	-	-
시 비	3,318	3,318	-	-

○ 사업기간 : 2014∼2019년 (6개년)

○ 사업내용 : 정비기반시설 확충 및 정비

- 도로개설 5개소(L=561m, B=4~10m), 주차장 5개소, 공원 2개소 등

□ 추진상황

○ 도활공모 사업 2개 구역 사업 선정(국교부)	: '13. 10. 30.

○ 지방재정 투‧융자심사 완료	: '13. 11. 14.

○ 정비계획 수립 및 정비구역지정 도시계획위원회 심의	: '14. 12. 23.

○ 정비계획 수립 및 정비구역지정 고시	: '15.  3.  9.

○ 정비계획 사업시행계획서 고시	: '15.  4. 13.

○ 공사 착공	: '17.  8.

※ 〔보상〕 96% 완료(총 134건 중 129건) / 〔공사〕 공정율 70%

□ 금후계획

○ 풍남초교인근 구역 잔여 공사 추진	: '19. 7.∼10.

○ 강당재 구역 잔여 보상 및 공사 추진	: '19. 7.∼12.

하도급관리팀

동산동 우리마을 가꾸기 사업

○ 주거지재생으로 지역주민에게 최소한의 기초생활 수준 보장

○ 정주여건 개선을 통한 주민커뮤니티 회복 및 지역역량 강화

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 동산동 610-1번지 일원(A=33,765㎡)

○ 총사업비 : 60억원(국비 30, 시비 30)

(단위 : 백만원)
구분	총투자 규 모	기투자	이후 투자계획			비고
		2018년까지	2019년	2020년	2021년
계	6,000	3,736	1,000	1,264	-
국 비	3,000	1,868	500	632	-
시 비	3,000	1,868	500	632	-

○ 사업기간 : 2016∼2019년 (4개년)

※ 국비 분할 지원에 따른 사업기간 연장 예정('19년 → '20년)

○ 사업내용

- 도로 4개 노선(L=489m, B=4~8m), 주차장 1개소(1,900㎡)

- 공원 2개소(1,904㎡), 공동이용시설 2개소(1,255㎡) 등

□ 추진상황

○ '16년 도시활력증진개발지역 공모사업 선정(국토부)	: '15.  5.

○ 정비계획 용역 추진	: '16.  4.∼'17. 6.

○ 정비계획 및 정비구역 변경 지정 고시	: '17.  7.

○ 사업시행계획서 고시	: '17. 12.

○ 실시설계용역 완료	: '18.  6.

○ 편입토지 측량, 분할 및 감정평가 완료	: '18.  6.

※ 〔보상〕 63% 완료(토지 47/78건, 지장물 19/26건 완료)

□ 금후계획

○ 잔여 토지 및 지장물 보상 협의	: '19. 7.∼12.

○ 우리마을 가꾸기 사업 추진

- 주민공동이용시설 건립 추진	: '19. 7.∼'20. 6.

- 기반시설 사업 추진(도로, 주차장, 공원)	: '19. 7.∼'20. 9.

하도급관리팀

지역건설업체 활성화 추진

민간 대형건설공사(공동주택 등)에 지역 전문건설업체의 하도급 참여율 향상으로 지역건설산업 활성화 도모

□ 현  황

○ 대    상 : 300세대 이상 공동주택 및 연면적 10,000㎡이상 건축물

- 시공중인 공동주택단지 15개소‧연면적 10,000㎡이상 건축물 5개소

○ 사업내용 : 본사 및 공사현장 관계자 면담, 협조문 전달

- 대한전문건설협회 관계자 합동 방문

- 지역업체 하도급 참여 상황 점검 및 확대 요청

□ 추진상황

○ 하도급관리팀 신설	: '19. 1.

○ 지역건설산업 활성화 방안 수립	: '19. 2.

○ 대형건설공사 현장 점검(40회), 간담회 및 협조문 발송 등	: '19. 3.∼

- 하도급 예정공사에 대한 발주계획서 제출 요구(→시공사)

- 전문건설협회와 현장 방문 및 우수 지역전문업체 소개 (→시공사)

- 하도급공사 입찰시 협력업체와 지역업체의 동등한 참여 보장

※ 상반기 하도급 주요성과

∙ 건설업체의 지역업체 하도급 관련 인식 점진적 개선

∙ 우아주공1단지 재건축(우아한시티) 골조공사(80억)에 전주업체 참여

∙ 전주역 앞 주상복합공사(클래시아 주상복합)의 하도급 공사(7월 이후 분)

발주시 지역제한입찰(전북지역으로 제한)로 진행 의향 표명

□ 금후계획

○ 공사현장 관리 강화로 하도급 목표(60%) 달성

- 하도급공사 발주시기에 맞추어 공사현장 및 본사 방문 강화

○ 하도급률 저조시 본사 방문 등 특단의 대책 강구

주거복지과  소 관

□	전주형 주거복지네트워크 운영	----	38
□	저소득층 주거급여 지원	----	39
□	주거복지 서비스 홍보강화 사업	----	40
□	전주형 사회주택 공급 사업	----	41
□	저소득계층 노후주택 개‧보수 사업	----	42
□	도심빈집정비 주민공간조성 사업	----	43
□	빈집 실태조사 및 정비계획 수립 용역	----	44
□	부대임대아파트 수선비 지원	----	45
□	청년 매입 임대주택 공급	----	46
	저소득계층 임대보증금 지원	----	47
	해피하우스사업 확대 운영	----	48

주거복지정책팀

전주형 주거복지네트워크 운영

주거 및 복지관련 단체, LH 등이 참여하는 민‧관 협력 주거복지네트워크와 주거복지 공공건축가를 운영하여 주거복지 정책 모니터링, 자원연계 및 재능기부를 통한 주거취약계층의 주거안정 기여

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019. 1.∼12.

○ 사 업 비 : 5백만원

○ 사업내용 : 자원연계, 주거복지 세미나‧토론회‧교육 및 주거복지 정책 발굴
주거복지정책홍보, 주거복지 공공건축가 재능기부(자문 등)

○ 운영체계 : 주거복지네트워크, 주거복지 공공건축가 운영

- 네트워크 : 23개 단체 참여(LH 포함 주거 및 복지관련 단체)

- 공공건축가 : 20명 참여(건축사‧디자인‧부동산‧건축‧감정평가사‧주거복지전문가)

□ 추진상황

○ 주거복지네트워크 운영	: ’19. 1.∼6.

- 정기회의(2회), 주거복지 자원조사(19단체), 순회설명회 수요조사(6단체 신청)

- 주거복지 자원개발 및 연계(우정회 봉사단 집수리 완료 1건, 이사서비스 1건)

- 청년주거정책집담회(1회), 찾아가는 주거복지 상담‧교육(6회), 주거복지학교(5회)

- 주거복지 정보제공, 홍보사업 연계 수시 진행

○ 주거복지 공공건축가 재능기부 운영	: ’19. 1.∼6.

- 정기회의(1회), 자문회의(1회), 시민대상 건축상담(4회/13명 참여)

- 사회주택‧빈집정비‧해피하우스‧자율주택정비 등 자문 및 현장 지원

- 주거지재생포럼 참여, 자율주택정비사업 소모임 구성(12명 참여)

□ 금후계획

○ 주거복지네트워크 및 주거복지공공건축가 정기회의(2회)	: ’19. 7.∼12.

○ 찾아가는 주거복지 상담‧교육, 홍보사업(수시)	: ’19. 7.∼12.

○ 민간자원 활용 주거복지 서비스 연계 추진(수시)	: ’19. 7.∼12.

- 집수리봉사‧저소득층 보금자리 이사 지원 서비스 등

○ 주거복지 공공건축가 재능기부 운영(수시)	: ’19. 7.∼12.

주거복지정책팀

저소득층 주거급여 지원

주거가 불안정한 주거 취약계층의 주거비(임차 및 수선유지급여)를 지원함으로써 주거비 부담 완화 및 주거안정과 주거수준 향상 기여

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019. 1.∼12.

○ 사업규모 : 총 17,210가구(완산 10,287가구, 덕진 6,923가구)

○ 사 업 비 : 25,662백만원 (국비 90%, 도비 7% 시비 3%)

- 임차주거급여(24,162백만원), 수선유지급여(1,500백만원)

○ 지원대상 : 기준중위소득 44%이하 (1인 소득인정액 751천원, 4인기준 소득인정액 2,029천원 이하)

○ 지원내용 및 지원절차

구 분	지 원 내 용	지 원 절 차
임차가구	기준임대료를 상한으로 실제임대료 지급(현금지원)	신청접수(동) ⇒ 소득·재산조사(구청) ⇒ 개별주택조사(LH공사) ⇒ 보장결정 (시청) ⇒ 급여지급 및 변동관리(시청)
자가가구	주택노후도에 따른 주택수선 (378 ~ 1,026만원 수선지원)	주택조사 및 대상자 선정(LH공사) ⇒ 수선계획 확정 및 예산교부(시) ⇒ 주택 수선(LH공사) ⇒ 수선유지급여 정산(시)

※ 자가가구 주거약자 추가지원 : 고령자 50만원, 장애인 380만원

□ 추진상황

○ 2019년 수선유지 위․수탁 협약체결(전주시↔LH)	: ’19. 2.

- 325가구(경보수 230, 중보수 78, 대보수 17) 1,500백만원

○ 2019년 주거급여협의체(전주시, LH) 업무연찬	: ’19. 4.

○ 2019년 상반기 주거급여 지원 실적

- 임차급여 : 월 14,021가구(누계 84,124가구) 9,047백만원

- 수선유지 : 105가구(경보수 93, 중보수 10, 대보수 2)

○ 주거급여 보장결정 및 변동사항 처리 : 6,859건

□ 금후계획

○ 주거급여 신청 안내‧홍보 및 대상자 적극 발굴	: 연중

○ 주거급여 지원대상자 보장결정 및 통보	: 연중

○ 수요자 중심의 서비스 제공으로 매월 안정적 급여지원	: 매월

주거복지정책팀

주거복지 서비스 홍보강화 사업

공공‧민간의 주거복지 자원 및 서비스 수요자 사전파악을 위한 홍보강화를 통해 주거급여 사업 등 주거복지상담‧정보제공‧서비스 연계를 체계화 하고, 전주시 주거복지 정책 효율성 증대에 기여

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019. 4.∼12.

○ 사 업 비 : 10백만원

○ 사업내용 : 주거복지 서비스 홍보 강화 사업

- 공공·민간의 주거복지 정책 안내 매뉴얼 홍보자료 제작 및 배포

(동 주민센터, 민간단체, 시 행사시, 홈페이지 등 게재 배포 등)

- 주거복지 주요정책 순회설명회

- 주거복지센터 설치‧운영관리 매뉴얼 조사 및 개발(타지역 벤치마킹)

○ 사업방향

- 2019년 전주시 자체적으로 주거복지센터 시범운영

- 2020년 국토부 국비 공모사업 사전 준비(민간위탁 추진)

□ 추진상황

○ 주거복지센터 개소 및 시범운영	: ’19. 4.∼6.

- 주거복지관련 상담 진행(전화, 내방, 방문 등)

○ 주거복지센터 홍보‧교육사업 추진	: ’19. 4.∼6.

- 주거복지센터 리플렛 제작 및 배포 : 주민센터 및 관련단체, 각종행사시

- 시 홈페이지 주거복지센터 홍보게시판 마련

○ 주거복지센터 선진사례 벤치마킹(2회)	: ’19. 5.∼6.

○ 주거복지 주요정책 순회설명회(2회)	: ’19. 6.

○ 알기 쉬운 주거복지서비스 책자 제작	: ’19. 6.

□ 금후계획

○ 알기 쉬운 주거복지서비스 시 홈페이지 등 SNS 활용 배포	: ’19. 7.∼12.

○ 주거복지 주요정책 순회설명회 운영(4회)	: ’19. 7.∼ 9.

○ 주거복지센터 지속 운영방안 토론회 개최	: ’19. 9.

○ 주거복지센터 설치 운영관리 매뉴얼 마련	: ’19. 9.

사회주택팀

전주형 사회주택 공급 사업

전주시와 민간단체가 협력하여 주거약자 등의 주거비 부담완화와 주거의 안정성을 확보할 수 있는 수요자 맞춤형 사회주택 공급

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019. 1.∼12.

○ 사 업 비 : 1,000백만원

○ 사업내용 : 민‧관 공동출자 전주형 사회주택 공급

- 토지임대부 : 시에서 토지(건물)매입 ⇒ 민간에서 신축 및 리모델링

- 건물임대부 : 민간에서 토지(건물)매입 ⇒ 시에서 신축 및 리모델링

※ 시세 80% 이하 임대료, 최대 20년 임대, 단독·다가구형 사회주택 공급

○ 사업규모 : 민간 토지(건물포함) 매입을 통한 매년 1개소 이상 사회주택 공급

□ 추진상황

사업연도	공급형태	운영단체	사업장소	가구수	입주대상	비 고
		계		54가구
2017	토지임대부 리모델링형	한국주거복지 사회적협동조합	팔복동2가37-1 팔복동2가37-3	10가구	노인, 한부모, 신혼부부 등	· 2018.3. 입주 · 노후주거지 계층통합형
	시 소유주택 리모델링형	민달팽이 주택협동조합	동완산동435-2	5가구	청 년	· 2018.3. 입주 · 청년쉐어하우스
2018	토지임대부 리모델링형	한국주거복지 사회적협동조합	중화산동2가 15-26	15가구	여성 청년, 사회초년생	· 2019.3. 입주 · 기숙형 여성안심주택
2019	토지임대부 리모델링형	협동조합 함 집	효자동3가 1333	17가구	청년, 대학생	· 2019.4. 사업시행자 선정, 토지건물매입, 소유권이전완료
	토지임대부 리모델링형	사회적협동조합 마을발전소 맥	삼천동1가 666-13	7가구	노인, 청년	· 2019.6. 사업시행자 선정, 공유재산심의 등 행정절차이행중

□ 금후계획

○ 전주형 사회주택 사용수익허가	: ’19.  7.

○ 사업시행자 사회주택 리모델링 공사 시행	: ’19.  8.∼10.

○ 전주형 사회주택 입주자 모집 및 입주	: ’19. 11.∼12.

사회주택팀

저소득계층 노후주택 개‧보수 사업

저소득계층의 노후주택을 개‧보수하여 열악한 주거환경을 개선하고, 주거안정을 통해 주거 약자의 삶의 질 향상 도모

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019. 3.∼10.

○ 사 업 비 : 1,000백만원[국비(기금) 500, 시비 500]

○ 사업규모 : 250가구 ※가구당 인건비포함 400만원 한도

○ 사업대상 : 기초생활수급자, 차상위 등 저소득계층

○ 사업내용 : 지붕공사, 도배․장판, 창호, 보일러 등 집수리 및 소방시설 설치

□ 추진상황

(단위 : 가구)

구 분	계	지붕 (일반)	지붕 (슬레이트)	창호	도배․장판	화장실	보일러	천정․벽체 (단열)	전등 교체	기타
’19.6.기준	272	19	5	64	97	26	10	38	7	6

※ 장애인 등 주거약자 편의시설 및 주택용 소방시설(소화기, 단독경보형감지기)설치 : 64가구

□ 중점 추진사항

○ 노후주택의 누수로 도배지 오염, 천장반자 침하, 누전 위험 등 복합적피해가 발생하여 거주자의 건강, 위생, 안전을 위협

□ 도배공․목공․방수공 전문팀을 편성, 원스톱 노후주택 개․보수로 주거환경개선 강화

○ 장애인 가구를 대상으로 장애유형, 행동패턴 등을 고려하여 장애인이  생활하는데 불편이 없도록 편의시설 설치 확대

□ 주거복지네트워크 참여단체(중증장애인지역생활지원센터 등)와 연계 대상자 적극 발굴

□ 금후계획

○ 저소득계층 노후주택 개․보수 사업 추진	: ’19.  7.∼10.

○ 수혜자 만족도 조사 및 사업정산	: ’19. 12.

공공임대주택팀

도심빈집정비 주민공간조성 사업

도심지역 내 장기간 방치되어 정주환경을 악화시키는 빈집을 정비  하여 안전하고 쾌적한 도시경관 조성 및 주거환경 개선

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019. 1.∼12.

○ 사 업 비 : 240백만원(도비72(30%), 시비168(70%))

○ 사업대상 : 1년 이상 거주 또는 사용하지 않은 빈집

- 리모델링 후 5년 이상 주변시세의 반값 전‧월세 임대에 동의한 소유자

- 철거 후 3년 이상 공공용지(주민쉼터, 공용텃밭, 주차장 등)로 사용 동의한 소유자

□ 추진상황

○ ’19년 도심빈집 주민공간조성사업 추진계획 수립	: ’19. 2.

○ 사업대상지 신청 접수 및 대상지 선정	: ’19. 2.∼3.

- 텃밭보다는 주차장 조성에 주안점을 두고 대상지 선정

○ 철거 대상지 석면조사 및 실시설계 용역	: ’19. 4.∼5.

○ 반값임대주택 1개소(팔복동) 리모델링 공사 시행	: ’19. 5.∼6.

○ 도심빈집조성사업 철거 대상지 공사 시행	: ’19. 6.

- 총 9개소(주차장 5, 텃밭 4)

□ 금후계획

○ 주민공간조성(철거) 대상지 공사 착공 및 완료	: ’19. 7.∼8.

○ 반값임대주택 리모델링 공사 시행	: ’19. 8.∼9.

- 2개소 내역 작성 및 협의 중(인후동)   ※ 1개소 완료(팔복동)

○ 반값임대주택 입주대상자 모집 및 입주	: ’19. 9.∼12.

- 3개소 중 1개소는 청년을 위한 셰어형 반값임대주택 추진

공공임대주택팀

빈집 실태조사 및 정비계획 수립 용역

빈집의 노후‧불량상태나 붕괴위험 등 정확한 실태조사를 실시하여 빈집을 효율적으로 정비 또는 활용하기 위함

□ 용역개요

○ 용역기간 : 2019. 1.∼12.

○ 용 역 비 : 150백만원

○ 대    상 : 1년 이상 아무도 거주 또는 사용하지 아니하는 빈집

○ 용역내용 : 전주시 일원 빈집 실태조사 및 정비계획 수립

○ 용 역 사 : 한국국토정보공사(LX)

□ 추진상황

○ 빈집 실태조사 및 정비계획 수립 용역 추진계획 수립	: ’19. 2.

○ 빈집 실태조사 및 정비계획 수립 용역 계약 체결	: ’19. 3.

○ 빈집 실태조사용역 착수보고회 개최	: ’19. 4.

○ 빈집 실태 사전조사 및 현장조사	: ’19. 4.∼5.

○ 빈집 실태조사 용역 현지 확인	: ’19. 5.

- 덕진구 추천마을 빈집 실태조사 용역 수행 실태 점검

- 빈집 실태조사 LX 직원 직접 수행 ⇒ 정확성 확보를 위함

○ 확정 빈집 등급산정 조사 추진 완료	: ’19. 6.

※ 현장조사 완료 후 확정 빈집 현황 (‘19. 6. 기준)
구 분	총 계	단독주택	집 합		무 허 가
			다 세 대	아 파 트
빈집 물량	2,048	1,484	51	11	502

▸ 등급산정 조사 시, 빈집 추가 발견 및 철거 된 경우 등으로 물량 변동 가능

□ 금후계획

○ 확정 빈집 등급산정 조사(완산구) 및 소유자 면담 실시	: ’19. 7.

- 주요 구조부 및 위해성 항목조사에 따라 1~4등급 분류, 소유자 의견 조사

○ 중간보고회(실태조사 완료)	: ’19. 7.

○ 실태조사에 따른 정비계획 수립	: ’19. 8.∼12.

공공임대주택팀

부도임대아파트 수선비 지원

공공주택 특별법에 의거 LH공사가 매입한 효성 부도임대주택에 대하여 수선비를 지원함으로써 임차인 보호 및 서민주거 안정에 기여

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2016∼2020년 (5개년)

○ 사업규모 : 효성 부도임대주택 3개 단지 248호(LH국민임대주택으로 전환)

- 효성흑석마을(111호), 효성신촌마을(65호), 우아효성(72호)

○ 사 업 비 : 600백만원

○ 사업내용 : LH공사가 경매 매입한 효성 부도임대주택 3개 단지에
대해 5년간 주택수선비 총 30억원 지원

□ 추진상황

○ ’19년도 주택 수선비(6억 원) 지원(시→LH공사)	: ’19. 2.

○ 3개단지 주택 수선 공사 추진(LH공사)	: ’19. 3.∼6.

- 세대 전용부 유지보수, 지하 오‧배수관 보수공사, CCTV 설치공사 등

※ 효성부도임대주택 수선 추진 현황 (’16년∼’18년) : 3개단지 22.8억원

연 차	연 도	주 요 공 사	공사금액(억원)
1	’16년	세대 최초 개‧보수 공사(주택 내부 전면교체)	7.46
2	’17년	세대 일상보수, 옥상방수(신촌), 급수시설 변경(우아)	9.27
3	’18년	세대 일상보수, 옥상방수(흑석,우아), 창호‧배관 공사	6.15

□ 금후계획

○ 3개단지 주택 수선비 집행(LH공사)	: ’19.  7.∼11.

- 외벽 도장공사, 승강기 교체공사, 놀이터개선공사 등

○ ’19년도 주택 수선비 집행완료 및 정산	: ’19. 12.

공공임대주택팀

청년 매입 임대주택 공급

주거 빈곤층인 청년세대가 저렴한 임대료로 안정적으로 거주할 수 있는 매입임대주택을 공급하여 청년층의 주거 안정 및 청년 인구  유출 방지

□ 사업개요

○ 사업위치 : 전주시 일원(대학교 인근)

○ 사 업 비 : 2,388백만원

○ 사업규모 : 청년매입임대주택 24호(입주예정자 24~30명 정도)

○ 사업내용 : 대학교 주변의 다가구, 다세대, 도시형생활주택 등을

매입하여 시세의 30% 수준으로 청년임대주택 공급

□ 추진상황

○ 국토교통부로부터 청년 매입임대주택 24호 물량 배정	: ’19. 1.

○ 청년 주거정책 활성화를 위한 집담회	: ’19. 3.

○ 청년 매입임대주택 공급계획 수립	: ’19. 4.

○ 청년 매입임대주택 매입 공고	: ’19. 5.

○ 매입대상지 발굴 및 현지 조사	: ’19. 5.∼6.

□ 문제점 및 대책

○ 대학교 주변 주택 매입시 감정평가액과 실거래 가격의 매매 가격 차이(1.5∼2억원)로 협의 매수에 어려움

□ 대학교 주변 또는 대중교통이 편리하고 주거환경이 양호한 위치의 건물을 매입, 리모델링 후 청년임대주택으로 공급

□ 금후계획

○ 청년 매입임대주택 현지조사 및 대상지 선정	: ’19.  7.

○ 청년 매입임대주택 감정평가 및 매입	: ’19.  8.∼ 9.

○ 리모델링 공사 실시	: ’19.  9.∼11.

○ 입주자 모집공고·선정	: ’19. 12.

공공임대주택팀

저소득계층 임대보증금 지원

무주택 저소득계층이 장기임대주택 또는 기존주택 매입임대주택에 입주할 수 있도록 임대보증금을 지원하여 주거안정 및 주거수준 향상 도모

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019. 1.∼12. (사업비 소진 시까지)

○ 사 업 비 : 666백만원(도 266, 시 400) ※도비 40%, 시비 60%

○ 사업내용 : 기초(생계 또는 의료급여)수급자가 LH, 전북개발공사에서공급하는 장기임대주택(영구․국민임대) 또는 기존주택매입임대주택에 입주시 임대보증금 지원

○ 지원금액 : 가구당 10백만 원 이내(계약금 본인 부담)

○ 지원기간 : 1회 2년(2회 연장 가능-최대6년) / 무이자

□ 추진상황

○ 2011 ~ 2018년 지원 실적 : 1,054가구 4,744백만원(도비 1,895, 시비 2,849)

구 분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
가구 수(호)	140	96	142	134	121	173	132	116
사업비(백만원)	498	333	583	666	666	666	666	666

○ ’19년 임대보증금 지원 사업 공고	: ’19. 1.

- 임대보증금 지원 한도액 20백만원에서 10백만원으로 하향 조정

※ ’19. 2. 반월2지구 임대주택 842세대 입주로 사업비 조기 소진 예상되어 하향 조정

○ ’19년 임대보증금 지원 실적 : 112가구 483백만원

- 국민임대(28가구 253백만원), 매입임대(38가구 148백만원), 영구임대(46가구 82백만원)

□ 금후계획

○ 임대보증금 지원 사업 신청 접수 및 지원‧관리	: 연중

해피하우스팀

해피하우스사업 확대 운영

해피하우스 사업의 전 지역 확대 운영으로 서비스 소외지역 주민의

주거환경을 개선하고 주민참여 사업을 통한 건강한 마을환경을 조성하여 주거복지 실현 및 마을공동체 활성화 도모

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019. 1.∼12.

○ 사 업 비 : 391백만원

○ 사업규모 : 전주시 전지역 35개동(단독주택, 다세대 연립주택)

○ 사업내용

- 단독주택․다세대 연립주택 점검․보수(창문 부속품 및 배선기구 등 28개 품목 수리지원)

- 주방용품 살균소독, 해충방제, 변기청결 등 위생 서비스

- 주민참여사업, 마을개선 희망사업, 주택리폼교육, 무료 건축상담, 집수리용 공구 무료대여 등

- 2019년 벽화조성사업 추진 : 노송동(25백만원), 서서학동(20백만원)

○ 지원대상 : 기준 중위소득의 60% 이하자, 장애인, 고령자 등

□ 추진상황

○ 단독주택 점검․보수 등 서비스 실시 : 1,613세대 9,256건

서비스구분	건축설비	전기설비	클린(위생)	기타(설치지원 및 상담 등)
건 수	1,688	3,872	1,642	2,054

○ 집수리용 공구 무료대여 : 4개 센터 155건

○ 주택리폼교육 실시 : 4회/162명(도배․도색 / 정리수납 / 목공DIY / 건축설비)

○ 건축사 무료상담 실시 : 4회/14명(건축신고절차, 주택 리모델링, 건축법규 등)

○ 주민참여사업 지원 : 호성동 꽃 식재 등 상반기 6개동 10개 사업

○ 서서학동 공수내2길 담장도색	: ’19.  6.

□ 금후계획

○ 해피하우스 서비스 전 지역 수시 홍보(길거리, 마을단위)

○ 단독주택 다세대 연립주택 점검․보수 등 서비스 실시	: 연중

○ 노송동 천사길 담장벽화 조성3차 공사시행	: ’19.  7.∼10.

○ 주민참여 마을개선사업 대상지 선정 및 사업추진	: ’19.  7.∼11.

○ 해피하우스사업 주민 만족도 조사	: ’19. 12.

신도시사업과  소 관

□	전주대대 이전사업	----	50
□	천마지구 도시개발사업	----	51
□	에코시티 조성사업	----	52
□	에코시티 지구외 연계도로(4개소) 개설추진	----	53
□	전주교도소 이전사업	----	54
□	효천지구 삼천횡단교량 설치사업	----	55
□	효천지구 연계도로 확장공사	----	56

항공대대이전팀

전주대대 이전사업

북부권 지역의 쾌적한 도시환경 조성과 주․야간 사격소음 및 안전사고
예방을 위하여 전주대대 이전

□ 사업개요

○ 이전위치 : 덕진구 도도동 일원

○ 사업규모 : 314천㎡(9.5만평) 정도

※ 현부지면적 : 324천㎡(9.8만평)[자연녹지 5.7만평, 덕진공원 4.1만평]

○ 주요시설 : 통합생활관, 실내방음사격장, 탄약고, 관사, 식당 등 1식

○ 사업기간 : 2018∼2022년

○ 사 업 비 : 723억원 정도(기부재산 기준)

□ 추진상황

○ 전주대대 일원(송천동, 호성동) 사격소음 및 유탄피해 민원 발생, 부대이전 요구 : ∼’09.

○ 전주대대 이전 건의(전주시→국방부)	: ’09.  4.

○ 전주대대 이전 건의 및 협의요청(전주시→국방부, 이전대상지-완주군 봉동읍)	: ’14. 12.

○ 전주대대 이전대상지 변경(전주시 관내) 요청(전주시→국방부)	: ’17.  4.

○ 작전성 검토결과 통보(국방부→전주시, 도도동 조건부 동의)	: ’18.  7.

○ 항공대대 및 전주대대 통합 합의각서 제출(전주시→국방부)	: ’18. 10.

○ 시의회 제2차 정례회 본회의 의결	: ’18. 12.

○ 합의각서 체결(국방시설본부&전주시)	: ’18. 12.

○ 사업시행자 지정(전주시) 승인(국방시설본부→전주시)	: ’19.  2.

○ 전략환경영향평가 및 문화재지표조사 추진	: ’19.  2.

※ 전주대대 이전 지역발전방안 주민 및 비대위 협의 계속

□ 금후계획

○ 지원사업계획 주민합의 및 사업계획 승인건의(전주시→국방부)	: ’19.  8.

○ 사업계획 및 실시계획 승인 등 행정절차 이행	: ’19.∼’20.

○ 공사 착공 및 준공	: ’21.∼’22.

○ 전주대대 기부 및 양여재산 정산	: ’23.

공공기관이전팀

천마지구 도시개발사업

○ 35사단 부지개발로 인한 주변지역의 도시화 및 군부대시설 노후화

○ 도시균형발전과 난개발 방지하고 체계적인 북부권 도시개발

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 전주대대 주변 송천동․호성동 일원

○ 사업면적 : 도시개발구역 471천㎡

- 일반토지 291천㎡, 전주대대 180천㎡

○ 사업방식 : 혼용방식

○ 사업기간 : 2015∼2025년

※ 2019년 용역비 : 500백만원(구역지정, 전략환경영향평가)

□ 추진상황

○ 개발행위허가 제한지역 지정고시	: ’15.  7. 17.

- 제한기간 : 2015. 7. 17. ~ 2018. 7. 16.(제한기간 3년)

○ 개발행위허가 제한 변경(기간연장) 결정고시	: ’18.  7. 13.

- 제한기간(연장) : 2015. 7. 17. ~ 2020. 7. 16.(제한기간 5년)

○ 전주대대 이전사업 합의각서 체결	: ’18. 12. 28.

○ 천마지구 도시개발사업 구역지정 용역 착수	: ’19.  6. 17.

□ 금후계획

○ 도시개발사업 구역지정 용역 추진	: ’19.  7∼’20. 9

○ 행정절차 이행 및 구역지정 고시	: ’20. 10.

- 주민 의견청취 및 관계부서 협의, 도시계획위원회 심의

○ 도시개발사업 개발계획 수립 및 실시계획 인가 추진	: ’21.∼’22.

○ 토지보상 추진	: ’22.∼’23.

○ 도시개발사업 착공 및 준공	: ’23.∼’25.

에코시티팀

에코시티 2단계 조성사업

지역 균형발전 및 광역도시기반 구축을 위하여 도심지에 존재하는 군부대를 이전하고 북부권개발을 선도할 친환경 생태도시 조성

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 호성‧송천‧전미동 일원

○ 사업규모 : 1,988천㎡(계획인구 32,903명/13,161세대)

○ 사 업 비 : 3,684억원(민자) (1단계 2,723억원/ 2단계 961억원)

○ 사업기간 : 2006∼2020년 (1단계 ’17.6월 / 2단계 ’20.12월)

○ 사업방식 : 혼용방식(수용․사용방식+환지방식)

○ 추진방식 : 기부 대 양여방식

○ 사업시행자 : 전주시장(민간사업자 : ㈜에코시티)

□ 추진상황

○ 민간사업자 협약체결(전주시↔에코시티)	: ’06. 3.

○ 도시개발구역지정(개발계획 포함) 승인․고시	: ’12. 8.

○ 개발계획(변경) 및 실시계획수립 고시	: ’14. 2.

○ 공사 착공 및 준공(1단계)	: ’14. 9.∼’17. 6.

○ 1단계 보완관리공사 착수	: ’17. 7.

○ 항공대대 이전(송천동→도도동)	: ’19. 1.

○ 2단계 개발계획(변경)에 따른 업무협의(익산청, 교육청등) : ’19. 2.∼

○ 2단계 부지 문화재조사 및 토양오염 정화 착수	: ’19. 5.

□ 금후계획

○ 2단계 개발계획 및 실시계획 변경	: ’19.  9.

○ 2단계 본 공사 착공	: ’19. 10.

○ 2단계 사업 완료 및 최종정산	: ’20. 12.

에코시티팀

에코시티 지구 외 연계도로(4개소) 개설추진

전주00부대 이전부지 도시개발사업에 따른 접근 도로망 시설확충으로 도심 교통 혼잡을 해소하고 지역발전 도모

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 호성․송천․전미동 일원

○ 대    상 : 중로1-54, 대로3-22, 대로3-30, 중로2-138

○ 규    모 : L=2.69㎞, B=15~25m

○ 사 업 비 : 339억원

- 중로 1-54호 외 2개 노선 301억(민자) : 공사비 129억, 보상비 172억

- 중로 2-138호 1개 노선 38억(민자+시비) : 공사비(민자)20억, 보상비(시비)18억

○ 사업기간 : 2017∼2020년

□ 추진상황

<초포초～고당네거리, 미산초～용흥마을, 발단사거리～용흥마을 3개노선>

○ 연계교통체계 구축대책 국가교통정책 조정실무 위원회 심의통과 : ’12.  6.

○ 전북 교통영향분석‧개선대책심의위원회 심의	: ’14.  2.

○ 지구 외 연계도로 기본 및 실시설계용역 추진	: ’16.  4.∼’17. 12.

○ 도시관리계획 결정(변경) 및 실시계획 인가(고시)	: ’17.  4. 28.

○ 보상계획 공고	: ’17.  7.

○ 감정평가 및 보상협의(협의율:토지 100%, 지장물 98%)	: ’17.  9.∼

○ 공사 착수	: ’18.  1.

< 호성동 충만교회～초포로 대성식당 1개노선 >

○ 도시관리계획 시설 결정 및 지형도면 승인 고시	: ’18.  6.

○ 보상계획 공고 및 보상협의(협의율:토지 92%, 지장물 93%)	: ’18.  9.∼

○ 실시계획인가 고시	: ’18. 11. 15.

□ 금후계획

<초포초～고당네거리, 미산초～용흥마을, 발단사거리～용흥마을 3개노선>

○ 공사 준공	: ’20. 1.

< 호성동 충만교회～초포로 대성식당 1개노선 >

○ 미협의 토지 전북도 토지수용위원회 심의 개최	: ’19. 7.

○ 공사 착수 및 준공	: ’19. 7.∼’20. 12.

공공기관이전팀

전주교도소 이전사업

○ 교도소 인근지역 시가화에 따른 주거환경 저해로 이전 필요

○ 재소자 사생활 침해 논란 및 서남권 도시개발 장애요인

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 평화2동 작지마을 일원

○ 규    모 : 194천㎡(교정시설 188천㎡, 진입도로 6천㎡)

○ 사 업 비 : 1,500억원 정도 (국유재산관리기금 100%)

○ 사업기간 : 2015∼2023년

○ 시 행 자 : 법무부

□ 추진상황

○ 작지마을 부근 교도소 이전후보지 추천(市→법무부)	: ’14. 11.

○ 작지마을 부근 교도소 이전부지 선정(법무부)	: ’15.  3.

○ 도시관리계획 결정 및 행정절차 이행	: ’17. 10.∼12.

- 주민열람공고(11.1), 설명회(11.10), 간담회(11.20), 도시계획위원회심의(11.28)

○ 도시관리계획 결정 및 지형도면 고시	: ’17. 12. 22.

○ 전주교도소 이전 신축공사 설계용역 착수(법무부)	: ’18.  8.  1.

- 기본설계 및 실시설계 : 2018. 8. 1.~ 2020. 1. 22.(기본설계 8개월, 실시설계 10개월)

- 기본설계 중지(’19.3.5) : 이주대책 수립 기간소요, 측량 재계(’19. 5), 기본설계 완료예정(’19. 9)

○ 이전사업 협의(이주단지, 작지저수지, 사업민원)	: ’18.  8.∼

○ 작지마을 이주대책(안) 제출	: ’19.  2. 12.

○ 작지저수지 대체시설 조성 협의	: ’19.  6.  5.

□ 금후계획

○ 이주단지 및 이주대책 수립	: ’19.  8.∼’20.

- 예산 재배정, 위수탁 계약 체결 후 전주시 시행

○ 도시계획시설사업 실시계획인가	: ’20. 10.

○ 편입토지 보상 추진	: ’20.∼’21.

○ 공사추진	: ’21.∼’23.

택지개발팀

효천지구 삼천 횡단교량 설치사업

효천지구 준공 후 예상되는 교통량 증가에 대비한 접근 도로망 확충 및 삼천동 등 인근 생활권과의 연계된 교통체계 구축으로 지역 주민의 정주여건 개선과 원활한 교통흐름 유도

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 효천지구∼용리로(삼천동2가 호순이감자탕 앞)

○ 사업내용 : 교량(L=126.0m, B=36.5m~43.0m) 설치

- 차도(왕복6차선, 21.5m), 보도(북측 9.5m, 남측 5.5m)

○ 사 업 비 : 154억(효천 도시개발사업 추가사업)

○ 사업기간 : 2018. 1.∼2020. 12.

○ 사업시행자 : 한국토지주택공사

□ 추진상황

○ 효천지구 삼천 연결교량 설치 협의(LH)	: ’15.  7.∼’17. 10.

- 협의내용 : 효천지구 추가 사업으로 시행 결정, LH에서 직접 시행

○ 효천지구 토지평가협의회 개최(21차, 23차)	: ’16. 10. / ’18. 4.

- 21차 : 교량 40m 광폭으로 설치

- 23차 : 광장형 교량으로 폭 40m(인도 남측 6m, 북측 3m)로 설치

○ 기본 및 실시설계 용역 추진(LH)	: ’18.  3.∼’19. 9.

○ 전주시 경관위원회 심의(9차, 12차)	: ’18.  9. 19. / 11. 21.

○ 교량 공법제안서 공모 및 선정(LH)	: ’19.  3.∼4.

○ 도시관리계획 변경결정 입안	: ’19.  6.

- 주민(토지평가협의회 등) 의견 및 교통영향 분석결과 등을 반영하여 기 결정된  도시계획시설의 규모를 폭 20m ⇨ 36.5m∼43.0m 변경 필요

□ 금후계획

○ 도시관리계획 변경결정 및 지형도면 고시	: ’19.  7.

○ 실시계획 인가 및 실시설계 완료	: ’19.  8.∼ 9.

○ 공사발주 및 착공	: ’19. 10.∼12.

○ 공사추진	: ’19. 12.∼’20. 12.

택지개발팀

효천지구 연계도로 확장공사

효천지구 단지개발 완료시 지구내 도로(천잠로, 세내로)와 인접 국도(21호선)의 연계 교통체계 구축을 통해 교통정체 해소 및 주변의 원활한 교통흐름 유도

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 삼천동 세내교∼중인동 중인나들목(국도 21호선)

○ 사업규모 : 도로확장 L=3.4km, B=20∼25m

- 대로 3-14호선 : L=1.8km, B=25m, 중로 1-28호선 : L=1.6km, B=20m

○ 사 업 비 : 392억원

○ 기    간 : 2017. 3.∼2021. 12.

□ 추진상황

○ 지방재정 투융자사업 심사‧의결(원안의결)	: ’16. 10. 27.

○ 용역과제심의	: ’16. 10. 28.

○ 기본 및 실시설계 등 용역 추진	: ’17.  3.∼’18. 9.

○ 가로수 및 경관심의(원안의결)	: ’17. 11. 27.

○ 도시관리계획(도로 등) 결정(변경)	: ’18.  4. 30.

○ 설계자문 및 실시계획 인가 신청	: ’18. 11.∼12.

○ 편입토지 분할측량	: ’18. 12.

○ 실시계획 인가 및 보상계획 공고	: ’19.  3.

○ 감정평가(토지, 지장물) 완료	: ’19.  5.∼ 7.

□ 금후계획

○ 편입토지 및 지장물 보상협의	: ’19.  6.∼12.

○ 공사 추진	: ’20.  3.∼’21. 12.

걷고싶은도시과 소 관

□	북부권 국도대체 우회도로(용진~우아) 건설	----	58
□	새만금~전주간 고속도로 건설	----	59
□	쑥고개로(국립박물관~호동마을)조성사업	----	60
□	견훤로 교통체계개선(TSM)사업	----	61
□	기린대로(상리로~호남제일문네거리) 확장	----	62
□	전라감영옛길 보행환경 개선사업	----	63
□	금암교차로 개선 및 분수정원 조성사업	----	64
□	객사길 보행환경 개선사업	----	65
□	구도심(충경로) 문화거리 조성사업	----	66
	생태하천 복원사업(삼천, 아중천)	----	67
	객사천(소하천) 정비사업	----	68
	지방하천 정비사업(독배천, 금학천, 원당천)	----	69

도로시설팀

북부권 국도대체 우회도로(용진~우아)건설

북부권 국도대체우회도로(용정~용진) 1단계 사업과 연결 사업으로  북부권 우회 교통망 완성⇒교통량 분산으로 시내권 교통 소통 촉진

□ 사업개요

○ 위    치 : 완주군 용진읍∼덕진구전진로∼완산구 색장동 (국도17호선)

○ 사업규모 : 연장 9.8㎞ (전주시 6.58㎞), 폭 12.5m (4차로 전제 2차로)

- 전주시 6.58㎞ (1공구 1.58㎞, 2공구 5.0㎞)

○ 총사업비 : 2,148억원[국비 1,848, 시비 300 (1공구 176, 2공구 124)]

※ 토지매입비(시비) : 115억원 (기투자 64, ’19년 51)

○ 사업기간 : 2013∼2023년 (11개년)

○ 시행기관 : 국토교통부(익산지방국토관리청)

□ 추진상황

○ 1공구(용진읍-전진로) 공사착공(공정 44%)	: ’16.  9.

○ 1공구 용지매입 (보상율 56%)	: ’18. 10.

※ 2019년 현재까지 115억원으로 총 162필지 92,179㎡ 중 91필지 38,061㎡ 매입

○ 1공구 중앙토지수용 재결 신청(11필지/18,345㎡)	: ’19.  5.

○ 1공구 KOTI 사전기획조사 용역보고서 제출	: ’19.  6.

※ 한국교통연구원(KOTI)→익산청  B/C=1.02[비용편익비:1.0을 기준으로 1.0이상이면 경제적 타당성 유효]

□ 쟁점사항 및 대책

○ 2011년 타당성 조사결과 건설비용대비 교통량 및 경제성 부족 등        비용편익이 떨어진다는 이유로 4차로 전제 2차로 건설 예정

□ 2018년 교통수요예측 및 타당성용역 결과에 따라 4차로 전면개설을 위해 정부 합동감사

정책질의 등 정치권과 연계 지속 건의 결과 교통량및경제성용역비‘19년 10억 확보

※ 국토부에서 우리시가 건의한 내용에 대한 검증후 총사업비 변경 추진 예정

□ 금후계획

○ 2공구(전진로∼색장동) 공사착공	: ’19.  7.

○ 1공구 토지수용 재결 (11필지/18,345㎡, 11명)	: ’19. 10.

○ 1공구(용진읍∼전진로) 4차로 확정	: ’19. 11.

○ 전체구간 공사완료	: ’23. 12.

도로시설팀

새만금~전주간 고속도로 건설

새만금에서 전주까지 동서축을 잇는 고속형 직통도로를 건설하여 동서 간 교통체계로 물류비 절감, 지역연계성 강화, 새만금연계 관광활성화 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 새만금∼김제∼전주∼완주(익산∼장수고속도로)

○ 사업규모 : 연장 55.1km, 폭23.4m(4차로)

- 시 구간 : 5, 6, 7, 8공구, 연장 14.5㎞ [도로 6.5, 교량(11개소) 3.0, 터널(4개소) 5.0]

○ 총사업비 : 18,012억원 (국비, 도로공사)

- 기 투자 152억원, 2019년 3,305억원, 이후 14,555억원

○ 사업기간 : 2012∼2024년 (13개년)

○ 시행기관 : 국토교통부(한국도로공사)

□ 추진상황

○ 타당성조사 용역(국토부, B/C 1.24)	: ’12.  3.

○ 기본설계 용역 완료(한국도로공사)	: ’14. 11.

○ 실시설계 용역 완료	: ’17.  7.

○ 도로구역결정고시(국토교통부)	: ’18. 10.

○ 1, 2, 3, 4, 5, 7공구(경쟁입찰) 착공	: ’18.  5.∼9.

○ 6,8공구(제안입찰) 착공	: ’18. 12.

□ 금후계획

○ 용지보상 추진(한국도로공사)	: ’18. 12.∼’20. 12.

○ 변경노선에 따른 도로구역 변경 결정	: ’19. 10.

○ 공사추진 및 준공	: ’19.  8.∼’24. 12.

도로시설팀

쑥고개로(국립박물관~호동마을)조성사업

국도21호선 나들목과 국립박물관 간 연결도로로 혁신도시, 효천지구, 개발 등으로 심각한 교통체증이 발생되어 도로확장 필요

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 효자동2가 국립박물관∼호동마을 입구

○ 사업규모 : 연장 1.18km, 폭 15~18m → 35m

○ 총사업비 : 9,800백만원 (공사비 8,800, 보상비 1,000)

○ 사업기간 : 2017∼2021년 (5개년)

□ 추진상황

○ 국립전주박물관∼31호광장 공사완료(좌측)	: ’17.  8.∼’18. 10.

- 인도조성 L=473m, B=5.5m, 31호 광장 좌회전 차로 설치 L=65m, B=3.6m

○ 지방재정투자심사 완료	: ’18.  2.

○ 국립박물관∼호동마을 실시설계용역 착수	: ’18. 10.

○ 행정절차(경관심의, 교통성, 환경성 실시계획인가 등) 추진	: ’19.  3.∼8.

□ 쟁점사항 및 대책

○ 국립박물관∼국대도로 나들목 구간 확장(L=2.23km)은 사업비 과다      □ 최대 지정체 구간인 국립박물관~호동마을 입구 일부구간(L=1.18km) 우선 확장

※ 2019년 사업비 미확보 ⇨ 추경에 사업비 확보 및 발주 예정

□ 금후계획

○ 행정절차 이행 및 실시계획 인가 완료	: ’19.  8.

○ 실시설계용역 완료	: ’19.  9.

○ 공사착공 및 준공	: ’19. 10.∼’21. 12.

도로시설팀

견훤로 교통체계개선(TSM) 사업

첫마중길 조성 이후 견훤로에 차량통행이 집중되어 발생되는 교통 정체를 우아1단지 재건축사업과 연계하여 보도 및 차도폭 조정을 통한 차로수 증설로 가로 소통기능 향상

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 명주골네거리∼호성네거리

○ 사업규모 : 연장 1.2㎞, (보도폭 축소 4.0∼7.0 → 4.0m)

- 보도축소, 차로증설(1개차로), 신호운영체계 재수립

○ 총사업비 : 2,500백만원('18년 150, '19년 1,000, 이후 1,350)

○ 사업기간 : 2018∼2021년 (4개년)

□ 추진상황

○ 자체 투‧융자심사 (적정)	: ’17. 11. 7.

○ 기본 및 실시설계용역 착공	: ’18.  5.

○ 개선방안 및 관련부서 사전협의	: ’18. 10.

○ 경관심의 절차이행	: ’19.  3.∼5.

○ 교통시설안전진단 용역 완료	: ’19.  6.

□ 금후계획

○ 행정절차 이행(일상감사, 원가심사 등) 완료	: ’19.  7.

○ 기본 및 실시설계용역 완료	: ’19.  8.

○ 공사 착공 및 준공	: ’19.  8.∼’21. 12.

- 1차 : 명주골네거리∼우아1단지(0.7㎞)	: ’19.  8.∼’20. 12.

- 2차 : 우아2단지∼호성네거리(0.5㎞)	: ’21.  1.∼’21. 12.

도로시설팀

기린대로(상리로~호남제일문네거리) 확장

○ 장기미집행 사업 2020년 해제로 중추도로인 기린대로 사업을 마무리하여  미확장구간 도시계획도로 추진 및 상징적인 명품 도로개설

○ 확장사업을 통해 교통정체를 발생시키는 병목현상을 해결하여   시민 불편 해소 및 사고 예방 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진동 원대한방병원∼반월동 대흥교차로

- 1단계:월드컵경기장주변, 2단계:원대한방병원∼팔복동 상리로, 3단계:팔복동상리로∼호남제일문

○ 사업내용 : 총연장 L=7.54km (1단계 2.82㎞, 2단계 1.32㎞, 3단계 3.4㎞)

- 금회사업(3단계) : 도로확장 L=3.4㎞, B=35m → 50m (15m 확장)

○ 금회사업비(3단계) : 35,000백만원(공사비 23,000, 보상비 12,000)

○ 금회사업기간(3단계) : 2019∼2025년 (6개년)

□ 추진상황

○ 반월동 대흥교차로∼호남제일문 도로확장 완료	: ’02. 12.

○ 덕진동 원대한방병원∼추천대교∼팔복동 상리로 도로확장 완료	: ’08. 12.

○ 팔복동 상리로∼호남제일문 실시설계용역 착수	: ’19.  5.

□ 금후계획

○ 행정절차 이행(경관심의, 실시계획인가 등)	: ’19. 10.∼’20.  4.

○ 실시설계용역 완료	: ’20.  5.

○ 토지매입 및 연차별 사업추진	: ’20.  7.∼25. 12.

도로정비팀

전라감영옛길 보행환경 개선사업

한옥마을, 남부시장과 인접한 문화 및 상업의 중심 지역으로 보행자가 안전하고 편하게 걸을 수 있는 쾌적한 보행환경 개선을 통해 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 중앙동, 풍남동 일원(풍남문 일원)

○ 사업규모 : A=0.29㎢(11개노선 3.9㎞) [금회시행 : 풍남문4길 L=300m, B=8m]

○ 사업내용 : 보도설치, 지중화(한전, 통신) 등

○ 총사업비 : 2,200백만원(국 600, 시 1,600)

- 예산확보 : 2,200백만원 [18년:1,400,  19년:800 (한전·통신 지중화)]

○ 사업기간 : 2018∼2020년 (3개년)

□ 추진상황

○ 보행안전개선사업(행안부) 공모 선정	: ’17. 10.

○ 기본 및 실시설계용역 착수	: ’18.  5.

○ 시장 상인회 간담회 및 주민설명회(6회)	: ’18.  9.∼’19. 4.

○ 사업대상지 변경에 따른 풍남문4길 상인 간담회(2회)	: ’19.  3.∼6.

- 당초 풍남문2길(버스노선) 일방통행로 추진 어려움으로 4길로 변경

□ 문제점 및 대책

○ 주민설명회 이후 상인들(50여명) 상권위축 우려로 사업추진(일방통행) 강한 반대

□ 공감대 형성을 위한 민원대표 등과 간담회 및 주민설명 등을 통해 설득후 사업추진

□ 일방통행로 추진이 어려울시 보행자우선도로로 지정 추진 검토(행안부 승인사항)

□ 금후계획

○ 사업 변경 계획안 행안부 승인	: ’19.  7.

○ 간담회 및 주민설득	: ’19.  7.

○ 사업추진 결정 및 주민홍보	: ’19.  8.

○ 공사 착공 및 준공	: ’19.  9.∼12.

도로정비팀

금암교차로 개선 및 분수정원 조성사업

기형적인 5갈래 교차로를 4갈래 교차로로 개선하여 상습정체 및 교통사고 위험 해소하고, 인간과 자연이 공존하는 아름다운‘천만그루 정원도시’조성으로 전주 이미지 개선

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 금암교차로 일원(태평양수영장 일원)

○ 사업내용 : 교통섬(3,600㎡) 정비 1식, 분수광장(1,350㎡) 복원 1식 등

- 교차로 개선(22.5억) : 샘터(D5m) 1식, 교목 등 식재(48주), 바닥디자인포장 1식, 라운드벤치, 버스쉘터

- 분수광장 복원(9억) : 분수및폭포(D15m), 교목 등 식재(42주), 바닥디자인포장 1식, 라운드벤치

○ 총사업비 : 3,150백만원 (국 500, 시 2,650)

- 예산확보 : 1,800백만원(17년 600, 18년 1,200)

○ 사업기간 : 2017∼2020년 (4개년)

□ 추진상황

○ 금암광장 교차로 교통체계 변경 운영	: ’18. 12.

○ 교통, 경관, 지역활성화를 위한 총괄조경가 자문	: ’19.  1.∼5.

○ 금암광장 교차로 합동점검(전북경찰청, 경찰서)	: ’19.  3.

- 역주행 방지를 위한 총괄조경가 자문 변경안 동의

○ 교통섬 개선안 주민설명회(4회)	: ’19.  5.

○ 금암 분수정원 사업 실시설계 착수	: ’19.  5.

□ 금후계획

○ 행정절차 이행(도시림심의 등)	: ’19.  7.

○ 금암광장 교통섬 정비공사 재착수	: ’19.  7.

○ 추가사업비 확보(1회추경/1,350백만원)	: ’19.  7.

○ 금암광장 교통섬 정비공사 완료	: ’19. 12.

○ 분수광장 복원공사 완료	: ’20.  5.

도로정비팀

객사길 보행환경 개선사업

객사길은 한옥마을과 인접하여 지속적으로 관광객이 증가되고 있는지역으로 보행자가 안전하고 편하게 걸을 수 있는 쾌적한 보행환경개선을 통해 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 고사동 옥토주차장 일원(전주객사1길∼3길)

○ 사업내용 : 보행환경 개선 L=1.7km (5개노선)

○ 총사업비 : 2,000백만원(국 1,000, 시비 1,000)

- 예산확보 : 1,000백만원 (국 500, 시 500)

○ 사업기간 : 2019∼2020년 (2개년)

□ 추진상황

○ 객사길 5개노선 일방통행 및 보행공간 확보	: ’18. 11.

○ 기본 및 실시설계용역 착수	: ’19.  3.

○ 불법주정차 단속 CCTV 8대 설치	: ’19.  3.

○ 지역예술가 및 총괄조경가 현장 자문	: ’19.  4.

○ 주민설명회 개최	: ’19.  5.

□ 문제점 및 대책

○ 객리단길 상인회(객리단길 사람들) 보행환경 개선사업에 대해

부정적 의견으로 사업 추진전 구체적인 협의 요구

□ 기본계획(경관계획) 수립후 상인회와 간담회 및 상가 개별 설명으로 공감대 형성

□ 금후계획

○ 경관계획 지역예술가 및 총괄조경가 자문	: ’19. 7.

○ 간담회 및 주민설명회 개최	: ’19. 8.

○ 사업계획 “안” 행안부 승인	: ’19. 8.

○ 공사 착공 및 준공	: ’19. 9.∼’20. 12.

도로정비팀

구도심(충경로) 문화거리 조성사업

구도심 공동화와 통과교통 위주의 충경로를 다양한 문화가 있고 보행친화적인 문화거리로 조성하여 한옥마을의 외연을 확장하고 전통문화중심의 도시재생 활성화로 도시경쟁력 제고

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 중앙동 충경로(병무청오거리∼다가교)

[L=1,240m, B=25m(인도8.4m, 차도16.6m) 대로3-10호선, 개설 1980년, 중심상업지역]

○ 사업내용 : 문화거리 조성 1식(도로다이어트, 인도정비, 가로수 정비 등)

○ 총사업비 : 10,000백만원 (국 800, 시 9,200)

- 예산확보 : 1,400백만원 (18년 900, 19년 500)

○ 사업기간 : 2018∼2022년 (5개년)

□ 추진상황

○ 기본구상 및 타당성검토용역 착수(학술용역)	: ’18. 11.

○ 현황조사 및 국․내외 사례분석 등	: ’18. 12.

○ 교통현황 및 보행환경 조사	: ’19.  2.

○ 교통시뮬레이션 분석 용역 착수	: ’19.  3.

○ 국가예산확보 관련 행안부 방문	: ’19.  4.

- 2020년 보행환경개선사업 공모 계획 (8월중)

□ 문제점 및 대책

○ 문화거리 조성에 따른 차로축소에 대해 시민공감대 미형성

□ 차로 축소 시범운영 및 교통영향분석 실시후 공론화 과정을 통해 시민공감대 형성

- 차로축소 시범운영비(가시설물, 문화행사, 교통통제 등) 추경확보(50백만원)

□ 금후계획

○ 차로축소 시범운영 및 사업공론화	: ’19.  7.∼9.

○ 2020년 보행환경개선사업 공모 신청(행안부)	: ’19.  7.∼9.

○ 기본계획(차로조정안) 결정	: ’19.  9.

○ 실시설계 착수 및 준공	: ’19. 10.∼20. 4.

○ 공사추진	: ’20.  6.∼

하천관리팀/생태복원팀

생태하천 복원사업(삼천, 아중천)

자연친화적인 생태하천복원으로 수생태계 건강성을 회복하여 쾌적하고 편안한 하천환경조성 및 새만금 수질개선에 기여

□ 사업개요

구 분	삼 천	아 중 천
위 치	원당교∼전주천 합류점	재전마을∼소양천 합류점
사업기간	2011∼2020(9개년)	2017∼2021(5개년)
총사업비	27,997백만원(국 19,598, 시 8,399) - 19년: 138백만원(국 138)	30,000백만원(국 15,000, 시 15,000) - 19년: 1,488백만원(국 1,488)
사업내용	◦생태하천복원 L=9.8km - 호안(1.8km) 및 산책로(2.1km) 정비 - 수달 ․ 반딧불이 서식처 조성 1식 - 폐기물 처리 및 생태학습장 조성 1식	◦생태하천 복원 L=6.25㎞ - 오니준설 및 수생태계 복원 - 자연형 환경정비, 친수공간 조성 등

※ 생태하천사업(국비 50%, 시비 50%) : 아중천 시비 미확보 9,100백만원

□ 추진상황

(삼  천)

○ 기본 및 실시설계 추진	: ’11.∼’13.

○ 공사 추진(공정 93%)	: ’13. 12.∼

- 호안 및 산책로 정비, 수달서식처 조성 16,108㎡

- 보 철거(2개소) 및 개량(1개소), 반딧불이 서식처 조성 1식

○ 매립폐기물 조사 및 총사업비 변경 협의(환경부)	: ’17. 12.∼’18. 12.

(아중천)

○ 통합‧집중형 오염지류 개선사업(국비) 선정/통보(환경부)	: ’16.  4.∼12.

○ 아중천 기본 및 실시설계용역 추진	: ’17.  5.∼

○ 아중천 하천기본계획 변경 고시(익산청)	: ’18.  3.

○ 행정절차(경관․생태도시․설계자문․기술검토) 이행	: ’18. 12.∼’19. 6.

□ 금후계획

(삼  천)

○ 홍산교 부근 매립폐기물(5,943ton) 처리 및 생태학습장(11천㎡) 조성 : ’19. 7.∼’20. 6.

(아중천)

○ 행정절차(도 생태하천복원심의 등) 및 용역 완료	: ’19. 7.∼8.

○ 공사 착공 및 준공	: ’19. 9.∼’21. 12.

생태복원팀

객사천(소하천) 정비사업

안전하고 친환경적인 소하천 정비를 통해 치수안전도를 높이므로써 재해예방은 물론 쾌적하고 편안한 소하천환경 조성

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 대성동 128-1∼색장동 410-3(전주천 합류점)

○ 사업내용 : 소하천 정비 L=1.69km

- 호안정비 1.5km, 소교량 및 낙차공 등 기존 시설물 개량 1식

○ 총사업비 : 3,500백만원(국 1,750, 시 1,750)

- 예산확보 : 186백만원 (국 186, 시비 미확보)

○ 사업기간 : 2019∼2021년 (3개년)

□ 추진상황

○ 전주시 소하천 지정 및 소하천정비종합계획 고시	: ’16. 11.

○ ’19년 소하천 정비사업 국고보조금 확정	: ’18. 12.

○ ’19년 재해예방사업(소하천) 신규지구 사전컨설팅	: ’19.  1.

○ 소하천 정비사업 실시설계 용역 발주	: ’19.  2.

○ 소하천 정비사업 실시설계 용역 착수	: ’19.  5.

□ 금후계획

○ 소규모 환경영향평가 용역	: ’19.  7.∼12.

○ 실시설계 용역완료	: ’19. 11.

○ 공사 착공 및 준공	: ’20.  3.∼’21. 12.

하천관리팀

지방하천정비사업(독배천, 금학천, 원당천)

하천 재해로부터 인명 및 재산피해를 예방하고, 수생태 회복과 수질개선을 통해 시민에게 친수공간 제공

□ 사업개요

구 분	독 배 천	금 학 천	원 당 천
위 치	용복동 일원∼삼천 합류점	팔복동 전주페이퍼∼전주천 합류점	대성동 일원∼전주천 합류점
사업기간	2014∼2020 (7개년)	2016∼2021 (6개년)	2018∼2022 (5개년)
총사업비	28,312백만원 - 19년: 2,759백만원 (국 1,971, 도 788)	20,574백만원 - 19년: 882백만원 (국 630, 도 252)	9,043백만원 - 19년: 882백만원 (국 630, 도 252)
사업내용	하천정비 L=5.72km, 저류지 1식 등	하천정비 L=2.2km, 펌프장 1개소 등	하천정비 L=1.5km

※ 지방하천사업(국비 50, 도비 20, 시비 30) : 시비 미확보 (독배천 4,121 금학천 978 원당천 378)

⇒ 2020년부터 국가균형발전특별회계보조금 변경으로 시비 미확보 시 사업비 지원 중단 우려

□ 추진상황

○ 독배천 지방하천 정비사업 연차별 공사 추진 중	: ’15. 12.∼

- 공정율 31% : 교량 5개소, 호안정비 및 제방포장 3.0㎞ 등

○ 금학천 지방하천 정비사업 연차별 공사 추진 중	: ’18. 12.∼

- 공정율 6% : 수목이식 완료, 오니토(하천바닥 토사) 사토 등

○ 원당천 기본 및 실시설계용역 추진 중	: ’18. 11.∼

- 공정율 40% : 측량 완료, 관련기관 및 부서 협의, 주민설명회 등

□ 금후계획

○ 연차별 공사 지속 추진	: ’19.  7.∼

- 19년 주요 추진계획

․ 독배천 : 호안정비 L=4.9km 및 교량 4개소 등

․ 금학천 : 유지용수관(D600㎜) 설치 L=0.9㎞ 등

․ 원당천 : 설계 완료 및 총사업비 협의(국토부), 공사 발주(’19. 11.)

○ 지방하천 정비사업 완료 (독배천 ’20년, 금학천 ’21년, 원당천 ’22년)

체육종합시설추진단  소 관

□	전주 육상경기장 증축 및 야구장 건립	----	71
□	전시컨벤션·호텔 건립	----	72
□	전주 종합경기장 부지재생 용역	----	73

경기장이전팀

전주 육상경기장 증축 및 야구장 건립

전주 종합운동장이 노후화되어 육상경기장 및 야구장을 월드컵경기장  인근으로 이전, 쾌적한 체육시설을 조성하여 건전한 여가 공간 제공

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019.∼2023. 6.

○ 총사업비 : 900억원 정도 (시비 630, 지방채 270)

※ 육상경기장 420억, 야구장 330억, 토지보상 150억

○ 사업내용 : 부지면적 122,958㎡

- 1종 육상경기장 1식(15,000석 연면적 11,609㎡, 준비운동장 포함)

- 야구장 1식(8,000석 연면적 10,037㎡)

□ 추진상황

○ 사업계획 의회 동의(민자→재정)	: ’15.  7.

○ 2016년 정기분 공유재산관리계획안 의회 의결	: ’15. 12.

○ 2016년 제4차 중앙투자심사(재검토)	: ’16. 11.

○ 지방재정 중앙투자심사 재상정(전북도→행정안전부)	: ’19.  4.

○ 2019년 지방재정 투자심사 완료	: ’19.  7.

□ 금후계획

○ 집행기본계획서 제출, 대형공사입찰방법심의 등	: ’19.  7.

○ 토지매입 및 실시설계 추진	: ’19.  9.

○ 행정절차 이행(건축허가, 각종영향평가 및 심의 등)	: ’20.  1.∼6.

○ 공사 착공	: ’20.  8.

○ 공사 준공	: ’23.  6.

전시컨벤션팀

전시컨벤션‧호텔 건립

제3금융중심지 지정을 대비한 전시‧컨벤션 인프라 구축으로 한옥마을 등 지역 관광자원과의 시너지 효과를 창출하여, 지역경제 활성화를 이끌 MICE산업의 핵심기지 조성

□ 사업개요

○ 기    간 : 2020∼2023. 6.

○ 총사업비 : 1,300억원 정도 (민간자본)

○ 사업내용 : 부지면적 17,800㎡

- 전시컨벤션 : 전시장 5,000㎡, 국제회의장 1실(2,000명 수용)

중소회의실 10실

- 호      텔 : 200실 이상

○ 사업방식 : 민간자본유치 (백화점 부지 장기임대에 따른 기여)

○ 임대면적 : 23,000㎡ 정도 (백화점 부지)

※ 전주 종합경기장 부지재생 용역 결과에 따라 사업규모 조정

□ 문제점 및 대책

○ 일부 시민단체 및 상인들의 지속적인 반대 민원

□ 대시민 홍보 강화로 사업 필요성 공감대 형성

□ 민간사업자와의 적극적인 협상을 통해 지역상권 피해 최소화 방안 마련

□ 금후계획

○ 종합경기장부지 재생용역 착수	: ’19. 하반기

○ 신규 협약서(안) 작성	: ’19. 하반기

○ 사업계획 및 공유재산관리계획 변경(의회)	: ’20. 상반기

○ 기존 협약 해지 및 신규 협약 체결	: ’20. 상반기

○ 행정절차 이행(도시관리계획변경, 건축허가 등)	: ’20. 상‧하반기

○ 사업 착수	: ’20. 하반기

전시컨벤션팀

전주 종합경기장 부지재생 용역

전주시민의 추억이 깃들어 있는 종합경기장의 정체성을 지켜내는 한편, 시민들의 다양한 욕구를 충족시킬 수 있는 재생계획 수립하고자 함

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019. 8.∼2020. 2.

○ 사업위치 : 덕진구 기린대로 451 일원

○ 사업면적 : 122,975㎡

- 육상경기장 39,970㎡, 야구장 19,230㎡, 기타 63,775㎡

○ 사 업 비 : 360백만원 정도

○ 사업내용 : 전주 종합경기장 부지재생 기본구상 및 타당성 조사

- 환경조사, 사례조사 및 벤치마킹

- 시설수요예측, 경제적 타당성 분석

- 재생컨셉 제안, 도입시설 및 프로그램 구상

- 건축 가이드라인 제시

- 공간 기본배치 구상, 교통‧동선계획, 조경‧녹지계획

□ 금후계획

○ 입찰공고, 제안서 접수 및 평가	: ’19. 7.

○ 사업자 선정‧계약 및 용역 착수	: ’19. 8.

○ 시민 소통 및 각계각층 의견 수렴	: ’19. 8.∼

□ 전문가 자문단·시민참여단 운영 및 의회 보고 등

○ 용역 완료	: ’20. 2.