제376회 전주시의회 제2차 정례회 2020년도 행정사무감사 도 시 건 설 위 원 회

2020년도

주요업무 추진상황 보고

생 태 도 시 국

보  고  순  서

□	일 반 현 황		-------	1
□	부 서 별 주 요 기 능		-------	2
□	기 본 현 황		-------	3
□	주요업무 추진계획
	○	생태도시계획과	-------	8
	○	천만그루정원도시과	-------	16
	○	건축과	-------	25
	○	주거복지과	-------	36
	○	신도시사업과	-------	48
	○	걷고싶은도시과	-------	57
	○	시민의숲 1963추진단	-------	70

일  반  현  황

□ 기  구 : 7과 32팀

													생태도시국
생태도시 계 획 과 (6팀)					천만그루 정원도시과 (6팀)					건축과 (6팀)					주 거 복지과 (4팀)					신도시 사업과 (3팀)					걷고싶은 도 시 과 (4팀)					시민의숲 1963추진단 (3팀)
생태도시 행 정					천만그루기 획					광고물행정					주거복지 정 책					택지개발					도로시설					1963기획
생태도시 계 획					천만그루 조 성					공동주택					사회주택					에코시티					도로정비					경기장이전
생태도시 조 성					정원문화 산 업					건축정책					주거재생					부대이전					생태하천					컨벤션시설
토지관리					꽃 도 시 조 성					주택재개발					해피하우스										걷고싶은길 조 성
공간정보					공원조성					하도급관리
주소정보					산림관리					건축안전

□ 정‧현원

과 별		총계	일 반 직						임기
			4급	5급	6급	7급	8급	9급
계	정원	127	1	7	32	40	34	13
	현원	136	1	8	40	46	22	16	3
생태도시계획과	정원	24	1	1	6	8	5	3
	현원	24	1	2(파견1)	6	11	3	1
천만그루 정원도시과	정원	23		1	6	9	6	1
	현원	24		1	6	6	8	2	1
건 축 과	정원	23		1	6	5	9	2
	현원	26		1	11	5	2	6	1
주거복지과	정원	15		1	4	5	1	4
	현원	16		1	6	6	1	1	1
신도시사업과	정원	14		1	3	2	5	3
	현원	15		1	3	6	3	2
걷고싶은도시과	정원	18		1	4	7	6
	현원	18		1	4	6	4	3
시민의숲 1963추진단	정원	10		1	3	4	2
	현원	13		1	4	6	1	1

부서별 주요기능

과 별	분 장 사 무
생태도시 계 획 과	○ 전문건설업 등록 관리 ○ 지속가능한 생태도시 종합계획 ○ 도시기본계획수립 및 관리계획결정, 도시계획사업 시행인가 ○ 지적업무 총괄, 공시지가, 부동산중개업 지도‧감독 ○ 공간정보시스템 운영 및 연계사업 관리, DB관리 ○ 도로명주소 홍보 및 부여사업, 시설물 관리
천만그루 정원도시과	○ 천만그루정원도시 종합계획 수립 및 추진기반 조성 ○ 도시녹화사업 종합계획 수립, 도시녹화사업 추진, 녹지시설물 관리 ○ 정원문화 확산 및 시민참여 활성화 ○ 전주 꽃심 지방정원 조성, 꽃도시 조성 및 양묘장 관리 ○ 공원조성계획 수립, 국토공원화 사업, 공원시설물 관리 ○ 재해로부터 안전한 산림관리 추진, 산림속 휴양공간 조성
건 축 과	○ 옥외광고물 관리 및 정비, 간판개선사업 ○ 주택건설사업계획승인, 사용검사, 입주자 모집 승인 ○ 건축인·허가, 건축심의, 건축 안전관리 추진 ○ 총괄건축가 자문 및 공공건축 설계공모 운영, 도시주거환경개선 ○ 주택재개발ㆍ재건축 ○ 지역건설업체 활성화
주거복지과	○ 주거복지 기본계획 수립, 저소득층 주거급여 지원 ○ 주거복지센터 운영, 비주택거주자 주거상향 지원 사업 ○ 전주형 사회주택 및 청년매입임대주택 공급 ○ 저소득층 노후주택 개보수 사업 ○ 주거지재생(팔복동 빈집밀집구역 특화재생) ○ 빈집 정비사업 및 빈집 플랫폼 운영 ○ 골목길 정비사업 추진 ○ 해피하우스 서비스 지원 및 사업 추진
신 도 시 사 업 과	○ 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립 ○ 택지개발사업 계획 및 공사 ○ 도시개발사업완료지구 유지관리 ○ 부대이전 및 부지개발 ○ 전주교도소 이전·신축사업 및 이전부지 활용방안 구상
걷고싶은 도 시 과	○ 국‧공유재산(도로)관리 및 용도폐지 ○ 신규 도로개설 및 용지보상, 도시가로망 확충 ○ 국도 및 고속도로 지원 ○ 도로유지관리, 도로안내표지판 및 가로등 관리 ○ 생태하천 복원사업 및 하천공사 ○ 전주시 걷고싶은길 통합 관리
시민의숲 1963추진단	○ 전주 종합경기장 부지재생 ○ 옛 대한방직 부지 관련 공론화위원회 추진 ○ 전주 육상경기장 증축 및 야구장 건립 ○ 전시컨벤션·호텔 건립

기  본  현  황

□ 도시계획 연혁

년 월 일	고 시 청	번 호	계획면적 (㎢)	목표 년도	계획인구	주 요 내 용
1938. 5. 9	조선총독부	403	19.76	1948	100,000	도시계획구역 결정
1966. 2.10	건설부	2,188	108.71	1983	550,000	도시계획 재정비
1970. 4.14	″	178	157.22	1986	500,000	도시계획 일부 변경
1973. 6.27	″	258	313.20			개발제한구역 216.4㎢지정
1974. 8.14	″	272	313.20			도시계획 재정비
1976. 3.27	″	37	313.20			도시계획 재정비
1984. 9. 8	″	442-16839	313.20	2001	800,000	도시기본계획 승인
1986. 5. 8	″	206	313.20	1991		도시계획 재정비
1991.12.27	″	30312-36414	313.20	2001	848,000	도시기본계획 변경 승인
1995. 6.29	전라북도	112	313.20	2001		도시계획 재정비
2002. 9.25	건설교통부	58450-899	313.18	2021	850,000	도시기본계획 승인
2003. 6.26	건설교통부	161	313.20			개발제한구역 225.4㎢해제
2005. 7.29	전라북도	186	313.18	2010		도시관리계획 재정비
2007. 5.14	전주시공고	510	313.18	2021	850,000	도시기본계획 일부 변경
2009. 2.11	전주시공고	255	313.18	2021	850,000	도시기본계획 일부 변경
2012.10.18	전주시공고	1151	206.11	2025	780,000	도시기본계획 승인
2015. 8.28	전주시공고	112	206.28	2020		도시관리계획 재정비
2020. 8.24	전주시공고	2161	205.49	2035	750,000	도시기본계획 승인

□ 용도지역 ------- 4개지역 196.26㎢(비도시지역 9.23㎢제외)

구분	주 거 지 역				상업 지역	공 업 지 역				녹 지 지 역
	계	전용주거	일 반 주 거	준 주거		계	전용공업	일반 공업	준 공업	계	생산 녹지	자연 녹지	보전 녹지
면적	37.98	0.38	36.41	1.19	4.82	7.00	1.51	4.41	1.08	146.46	26.73	69.65	50.08
비율 (%)	18.5	0.2	17.7	0.6	2.3	3.4	0.7	2.1	0.5	71.3	13.0	33.9	24.4

□ 용도지구 ------- 6개지구 19,346,907㎡

지 구 명	개 소 수	면 적(㎡)	비 고
고 도	24	7,756,554
방 화	22	4,270,374
경 관	91	3,758,441	자연,시가지, 역사문화
자연취락	156	3,306,359
시설보호	1	249,000
보 존	2	6,179

□ 토   지                    (단위 : 필, ㎢, %)

구분	합 계		대 지			임 야			기 타
	필지수	면적	필지수	면적	비율	필지수	면적	비율	필지수	면적	비율
계	193,841	206.2	77,546	32.9	15.9	10,597	66.1	32.1	105,698	105.6	51.9

□ 공원 분포현황

구분	전주시 전체		공 원 면 적			공 원 결정율 (C/A)	1인당 공원면적
	면적(A)	인구(B)	결정(C)	조성(D)	조성율 (D/C)		결 정 (C/B)	조 성 (D/B)
계	206.3㎢	655천명	22.33㎢	5.65㎢	25.30%	10.83%	34.07㎡	8.62㎡

□ 공원현황                              (단위 : 개소, ㎡)

공원의 종 류		공 원 수			공 원 면 적			비고
		계	완산	덕진	계	조 성	미 조성
계		249	141	108	22,332,689.4	5,650,431.9	16,682,257.5
도립공원		1	1		5,608,490	939,069.0	4,669,421.0	모악산
도시공원 총계		248	140	108	16,724,199.4	4,711,362.9	12,012,836.5
생활권공원	소 계	239	135	104	14,323,394.2	4,117,052.9	10,206,341.3
	근 린 공 원	61	34	27	13,988,343.8	3,785,711.5	10,202,632.3
	어린이공원	135	80	55	290,928.9	290,928.9
	소 공 원	43	21	22	44,121.5	40,412.5	3,709.0
주제공원	소 계	9	5	4	2,400,805.2	594,310.0	1,806,495.2
	역사공원	2	2		1,692,385.0	80,740.8	1,611,644.2	산성, 중앙
	문화공원	4	2	2	40,230.9	40,230.9		태평,곰솔나무,팔복,만성문화
	수변공원	2		2	246,808.3	246,808.3		기지제, 만성수변
	묘지공원	1	1		421,381	226,530	194,851
	체육공원	-	-		-	-	-

□ 공원시설물 현황                              (단위 : 개)

합 계	편의시설	운동시설	화장실	어린이 놀이시설	공원등	보안시설 (CCTV)	비 고
15,838	6,768	2,513	82	660	5,393	422

□ 가로수 식재현황                            (단위:그루)

구분 노선수	합계	느티 나무	은행 나무	벚나무	이팝 나무	단풍 나무	회화 나무	낙우송	기타
288	64,030	16,856	12,063	6,782	8,478	5,796	1,745	1,306	11,004

□ 보호수 및 노거수 현황                       (단위:그루)

구 분	계	느티나무	왕버들	은행나무	팽나무	회화나무	참죽나무	주엽나무
보호수	25	9	6	7	1	1	1
노거수	74	26	27	2	16	2		1

□ 소유별 임야면적                              (단위:㏊)

총 계	사유림	국유림	공유림	비 고
6,249	5,415	677	157

□ 보전산지 현황                                (단위:㏊)

계	보전녹지	자연공원	문 화 재 보호구역	조 수 보호구역	사찰림	사방지	비고
4,460	3,760	623	25	23	28	1

□ 주    택                                        (단위:세대)

구 분	계	단독주택	다세대주택 동당660㎡미만	연립주택 (4층이하)	아파트 (5층이상)	일 반 가구수	주 택 보급율
주택수	314,263	130,498	4,321	4,490	174,954	278,130	112.99%
비율(%)	100	41.5	1.4	1.4	55.7

□ 도시․주거환경정비 예정지구 현황

방 식	개소수	면 적 (㎢)	세 대 수
			계	현 재	증 가
계	43	2.79	32,901	16,950	15,951
주택재개발	14	1.44	15,618	5,953	9,665
주택재건축	15	0.48	9,804	6,762	3,042
주거환경개선	14	0.87	7,479	4,235	3,244

□ 광고업 등록 및 옥외광고물 현황

(’20년 10월말 기준)

광고업자 등록현황 (명)	옥외광고물 (개)	시 지정 광고시설(개소)
		계	게시대	벽보판	육교 현수막	비 고
371	48,158	215	162	50	3	전주시 시설관리공단 운영

□ 도    로                                        (단위:개소, ㎞)

구 분	계		고속국도		일반국도		지 방 도		시 도
	노선	연장	노선	연장	노선	연장	노선	연장	노선	연장
총연장	2,745	837	2	13	5	35	2	15	2,736	774
포장도	2,745	837	2	13	5	35	2	15	2,736	774
포장율 (%)		100		100		100		100		100

※ 도로율 : 8.17%(도로면적/시가지면적)

□ 교량 및 기타시설물                                (단위 :개)

구분 계	교 량					육교	지하 보도	지하차도	터널	언더 패스	비고
	소계	고속 국도	일반 국도	지방도	시도
180	142		22	4	116	9	6	4	2	17

※ 장대교량 (삼례교 : 570m, 회포대교 : 707m)

□ 하천현황                                          (단위 : ㎞)

구 분		개소	하천연장	제 방 연 장			개수율 (%)	비고
				계	기개수	미개수
계		32	116.3	201.7	140.9	60.8	69.9
법정하천	소 계	20	99.6	168.3	138.3	30.0	82.2
	국가하천	3	18.2	32.2	32.2	-	100.0
	지방하천	17	81.4	136.1	106.1	30.0	78.0
소 하 천		12	16.7	33.4	2.6	30.8	7.8

□ 택지개발 현황

구 분	계		완 료		추 진 중
	개소수	면 적(㎡)	개소수	면 적(㎡)	개소수	면 적(㎡)
합 계	30	23,567,490	29	21,569,780	1	1,997,710
구획정리	12	6,819,077	12	6,819,077	-	-
택지개발	13	6,342,924	13	6,342,924	-	-
도시개발	5	10,405,489	4	8,407,779	1	1,997,710

□ 도로명 현황                                        (단위 : 개)

구 분	계	대로	로	길	비고
도로명수	1,216	3	205	1,008

□ 도로명주소 안내시설                                (단위 : 개)

구 분	합계	도로명판	기초번호판	국가지점 번호판	지역안내판	건물번호판
시 설 물	78,519	12,101	2,069	328	64	63,957

생태도시계획과  소 관

□	전주 도시관리계획 재정비	----	9
□	서학동 예술마을 지구단위계획 수립	----	10
□	지속가능한 생태도시 종합계획 세부실천계획	----	11
□	2020년도 개별공시지가 조사	----	12
□	지적재조사 사업 추진	----	13
□	건설사업지 드론촬영과 영상제작 추진	----	14
□	찾아가기 쉬운 도로명주소 생활화 추진	----	15

생태도시계획팀

전주 도시관리계획 재정비

○ 도시관리계획에 대한 타당성 여부를 전반적으로 재검토하고 도시의 여건 변화 등을 반영하기 위하여 5년마다 정비하는 법정계획임

□ 사업개요

○ 공간범위 : 전주시 행정구역 전역 205.49㎢

○ 추진기간 : 2018. 4. ∼ 2021. 6.

○ 사 업 비 : 2,512백만원(재정비 2,113, 교통영향평가 183, 전략환경영향평가 216)

○ 주요내용

- 용도지역·지구·구역 등 재정비   - 지구단위계획 재정비

- 지구단위계획 및 기반시설의 설치, 정비 및 개량에 관한 계획 수립

- 장기미집행 도시계획시설 일몰제 대비 도시관리계획 수립 등

□ 추진상황

○ 용역착수 및 기초조사 실시	: ’18. 4.∼8.

○ 전주 도시관리계획 재정비(안) 작성 중	: ’19. 1.∼

○ 지구단위계획 수립 및 변경수립

- 서학동 예술마을 지구단위계획 수립	: ’19. 3.∼

- 팔복동 공업지역 지구단위계획 수립 고시	: ’19. 9. 11.

- 역사도심 지구단위계획 변경 수립 고시	: ’19. 11. 8.

○ 장기미집행시설 실효대상시설 실효 고시	: ’20. 7. 1.

□ 금후계획

○ 전주 도시관리계획 재정비(안) 작성 및 입안	: ’20. 12.

- 용도지역‧지구‧구역, 도시계획시설, 지구단위계획 정비(안)

○ 서학동 예술마을 지구단위계획 결정・고시	: ’21. 1.

○ 주민공람 공고 및 관계기관(부서)협의	: ’21. 1.∼4.

○ 시의회 의견청취 및 도시계획위원회 심의 등	: ’21. 4.∼5.

○ 전주 도시관리계획 재정비 결정 및 지형도면 승인 고시	: ’21. 6.

생태도시계획팀

서학동 예술마을 지구단위계획 수립

○ 다양한 예술인들이 거주하며 작품 활동을 하고 있는 서학동 예술
마을의 활성화를 도모하고 문화예술공간으로서의 지속성 유지

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 서서학동 및 동서학동 일원(167,777.3㎡, 5만평)

○ 기    간 : 2019. 3. ∼ 2021. 1.

○ 용도지역 : 제1종일반주거지역(4층이하)

○ 주요내용 : 지구단위계획구역 지정 및 계획수립

- 건축물 용도, 건폐율, 용적률, 높이, 기반시설 및 경관 등에 관한 사항

□ 추진상황

○ 용역착수(도시관리계획 재정비 용역 포함)	: ’19. 3.

○ 기초조사, 타지역 사례조사 및 관리방향 설정	: ’19. 3.∼5.

○ 서학동 예술마을 주민협의체 의견수렴	: ’19. 7. 2.

○ 지구단위계획(안) 작성	: ’19. 7.∼9.

○ 지구단위계획(안) 공공디자인단 협의	: ’19. 10.∼11.

○ 서학동 예술마을 주민 및 전문가 의견수렴	: ’19. 10.∼’20. 2

○ 전략환경영향평가 실시	: ’20. 2.∼10.

□ 금후계획

○ 관계기관(부서) 협의	: ’20. 11.∼12.

- 전략환경영향평가(안) 협의, 교통영향평가 심의 등

○ 주민공람 실시	: ’20. 11.

○ 전주시 도시・건축공동위원회 심의	: ’20. 12.

○ 지구단위계획구역 및 계획 결정 고시	: ’21. 1.

생태도시조성팀

지속가능한 생태도시 종합계획 세부실천계획

○ 생태도시 종합계획에 따른 5대 목표와 61개 실행과제 추진

○ 생태도시 종합계획 실천을 통한 지속가능한 생태도시 구현

□ 단계별 추진 전략

○ 1단계(준비단계) : 2016.∼2017.

- 조직구성, 조례제정, 시민홍보 및 참여(역량강화), 우선 및 시범사업 진행

○ 2단계(기반구축단계) : 2018.∼2020.

- 생태도시 근간사업 및 시민과 함께하는 사업 추진

○ 3단계(확산단계) : 2021.∼2025.

- 생태도시 관련 사업 본격화 및 정기적 평가(피드백)

□ 추진상황(‘20년)

○ 제2대 생태도시위원회 구성(22명)	: ’20. 1. 3.

○ 생태도시위원회 개최	: 2회, 심의 6건

○ 생태도시 사람들 이끌림 교육 실시	: 3회

○ 생태도시 세부실천계획 추진사항 점검(분기별) : 21개 부서, 3회

○ 생태도시 세부실천계획 가이드라인 적용(협의) 사업 : 46건

- 투수성포장, 고원식횡단보도, 저에너지 설비(LED) 적용 등

○ 생태도시민관협력기구 구성(전주지속가능발전협의회)

- 6개 분야 실행위원회 구성(하천, 녹지, 교육, 에너지, 생태교통, 도시계획)

□ 금후계획

○ 생태도시위원회 개최(수시)

○ 생태도시 사람들 이끌림 교육 실시(6회/년)

○ 생태도시 세부실천계획 추진사항 점검(분기별)

○ 생태도시민관협력기구 운영

- 정책협의회(2회/년) 및 6개 분야 실행위원회 회의 개최

- 생태도시 근간사업 및 시민과 함께하는 사업 추진

토지관리팀

2020년도 개별공시지가 조사

○ 정확한 지가 산정을 통한 지가 공신력 제고 및 재산권 보호

○ 토지 관련 국세‧지방세 및 각종 부담금 부과기준으로 활용

□ 사업개요

○ 근거법률 : 부동산 가격공시에 관한 법률

○ 대상필지 : 141,469필지(표준지 3,469필지)

- 사유지 124,058필지 / 국‧공유지 17,411필지

○ 조사기준일 : 연 2회

- (정기분) 1. 1. 기준 개별공시지가 ⇒  5. 29일 결정·공시

- (수시분) 7. 1. 기준 개별공시지가 ⇒ 10. 30일 결정·공시

※ 1.1.∼6.30.까지 분할, 합병 등 토지이동 사유가 발생한 토지

□ 추진상황

○ 정기분 개별공시지가 산정, 열람 및 의견접수    : ’20. 2. 13.∼5. 4.

○ 정기분 부동산가격공시위원회 심의, 결정·공시   : ’20. 5. 14.∼5. 29.

○ 정기분 결정지가 이의신청지 검증 및 재공시   : ’20. 5. 29.∼7. 27.

○ 수시분 개별공시지가 산정, 열람 및 의견접수    : ’20. 7. 27.∼9. 21.

○ 수시분 부동산가격공시위원회 심의, 결정·공시   : ’20. 10. 12.∼10. 30.

□ 금후계획

○ 7. 1. 기준 결정지가 이의신청지 검증 및 재공시 : ’20. 11.∼12. 28.

○ 2021년도 개별공시지가 토지특성조사	: ’20. 12.∼’21. 1.

토지관리팀

지적재조사 사업 추진

○ 토지의 현실경계와 지적공부상 경계가 일치하지 않는 지적공부를
현실에 맞게 정비하고 수치화 하여 시민의 재산권 행사 불편해소

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2013. ∼ 2030.(18개년)

○ 사업대상 : 불부합지 66,077필지(23.7㎢) / 전체 192,874필지의 34.2%

○ 총사업비 : 8,200백만원

○ 사업지구 : 11개지구 5,313필지 / 1,820천㎡

(단위 :필, 천㎡, 명)

구 분	사 업 지 구		필지수	면적	토지소유자
계	11개 지구		5,313	1,820	2,658
2018년 (3개지구)	소 계		1,344	191	683
	완산	서서학지구(서서학동 189-39 일원) 물왕멀지구(중노송동 399-44 일원)	666	95	371
	덕진	어은지구(진북동 947-1 일원)	678	96	312
2019년 (2개지구)	소 계		1,474	711	772
	완산	동완산지구(동완산동 369 일원)	706	113	321
	덕진	여의지구(여의동 530-4 일원)	768	598	451
2020년 (6개지구)	소 계		2,495	918	1,203
	완산	서완산1,2,3지구(서완산동1가 1-4 일원)	1,253	171	575
	덕진	호성에코1,2,3지구(호성동2가 319 일원)	1,242	747	628

□ 추진상황

○ ’18년 사업지구 경계협의 조정                : ’19. 12.∼ ’20. 10.

○ ’19년 사업지구 지적재조사 측량완료           : ’20. 2.∼ ’20. 7.

○ ’20년 사업예정지구 실시계획 수립	: ’20. 1.

○ ’20년 사업지구 대상지 지구지정               : ’20. 9.

□ 금후계획

○ ’18년 사업지구 경계결정 및 사업완료	: ’20. 11.∼’21. 3.

○ ’19년 사업지구 경계조정 및 의견수렴, 경계확정    : ’20. 11.∼’21. 11.

○ ’20년 사업지구 지적재조사 측량 및 경계조정   : ’20. 11.∼

공간정보팀

건설사업지 드론촬영과 영상제작 추진

○ 도시개발사업 등 건설사업 대상지에 대하여 사업구상 단계부터 완공시까지 단계별로 드론 촬영을 실시하고 관련 영상을 제작하여 사업 과정에서 참고자료로 활용하고 기록물로 관리하고자 함

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 1. ∼ 계속

○ 대    상 : 건설사업지역 34개소(도시개발사업·도로·하천·공공건축물 등)

부 서 명	대상지	부 서 명	대상지	부 서 명	대상지
생태도시계획과	2	한국철도시설공단	1	시민의숲1963추진단	2
건 축 과	1	천만그루정원도시과	3	-	-
걷고싶은도시과	19	신 도 시 사 업 과	6	-	-

○ 사업내용

- 건설사업 대상지에 대하여 사업 단계별로 드론 촬영을 실시하고   관련 영상을 제작하여 사업 과정에서 참고자료로 활용

- 전주의 변화과정을 담는 영상기록물로 관리

□ 추진상황

○ 건설사업 드론 촬영 및 자료 제공(34개 사업, 61회)	: ’20. 1. ∼

○ 드론 및 영상제작 프로그램 구입	: ’20. 5.

○ 촬영 대상지 확대 추진(5개 사업, 6회)	: ’20. 9. ∼

□ 금후계획

○ 촬영 대상지 수요조사(전부서 대상)	: ’21. 1. ∼

○ 사업대상지 촬영 및 영상 제작 추진	: ’21. 1. ∼

주소정보팀

찾아가기 쉬운 도로명주소 생활화 추진

○ 도로명주소 안내시설물 확충 및 정비와 홍보 활성화를 통해 시민

생활 편의 제공으로 찾아가기 쉬운 도로명주소 생활화 지속 추진

□ 사업개요

○ (안내시설물 확충 및 정비) 도로명판, 국가지점번호판, 건물번호판 등

○ (임차인 주소사용 편의제공) 다가구주택 등에 대한 상세주소 부여

○ (사용자 위주의 홍보) 도로명주소 원리 이해를 중심으로 홍보 실시

□ 추진상황

○ 안내시설물 확충	: 1,144개소

- 도로명판(보행자용) 1,115 / 국가지점번호판 29

○ 안내시설물 일제조사	: 32,546개소

- 도로명판 10,830 / 기초번호판 2,069 / 지역안내판 64 / 건물번호판 19,583

○ 다가구주택 등 상세주소 부여 확대 추진	: 627건

- 전입신고시 원스톱 처리(민원신청)	: 109건

- 대상지 조사 및 상세주소 직권 부여	: 518건

○ 도로명주소 원리이해 및 다가구주택 등 상세주소 부여 홍보

-「도로명주소 바로알기 퀴즈」를 통한 도로명주소 원리 이해 홍보

- 다가구주택 등 상세주소 부여 안내 스티커 부착 및 현장 홍보

□ 금후계획

○ 도로명주소 안내시설물 확충 및 유지관리	: ’21. 2. ~ 11.

○ 도로명주소 생활화 및 활용도 제고를 위한 홍보 실시  : ’21. 2. ~ 12.

천만그루정원도시과  소 관

□	도시숲 조성	----	17
□	도시 바람길숲 조성	----	18
□	혁신도시 미세먼지 저감숲 조성	----	19
□	시민과 함께하는 정원문화 확산	----	20
□	전주 꽃심 지방정원 조성	----	21
□	덕진공원 전통정원화 사업	----	22
□	장기미집행 도시공원 실효대책 추진	----	23
□	산림보호 및 숲 복지서비스 제공	----	24

천만그루조성팀

도시숲 조성

○ 도심 어디서나 만날 수 있는 숲을 조성하여, 미세먼지 문제와 기후

변화에 대응하고 도시전체를 숲과 정원이 어우러진 정원도시로 조성

□ 사업개요

○ 사업규모 : 13개 사업 / 43개소

- 녹색쌈지숲 조성 8, 도로변 가로정원 4, 주민참여형 마을정원 1, 통학로 녹지 조성 3,

팔복동 천년문화 테마숲 조성 8, 복지시설 나눔숲 조성 1, 기린대로 가로정원 1,

명상숲 조성 3, 도시공원 생태적환경개선 10, 호남제일문 마중길 띠녹지 조성 1,

전군도로 벚꽃길 조성 1, 종합경기장 교통섬 정원 1, 기린대로 가로화단 조성 1

※ 명시이월 2개 사업 별도 : 2019 팔복동 천년문화 테마숲 조성, 특색있는 공원조성(거마·팔복)

○ 사업기간 : 2020. 1. ∼ 12.

○ 총사업비 : 5,398백만원(본예산 3,606, 명시이월 1,792)

○ 사업내용 : 도심 내 녹색숲 조성 및 쉼터공간 조성

□ 추진상황

○ 도시림등의 조성·관리 심의위원회 개최(사업대상지 우선순위 결정) : '20. 1. 20.

○ 명시이월 사업 완료                                 : '20. 1.∼6.

- 팔복동 테마숲 조성 등 2개 사업(흰말채 등 113,584본 식재)

○ 사업별 실시설계용역 완료                         : '20. 2.∼6.

○ 도시숲 조성사업 추진                           : '20. 3.∼11.

- 7개 사업 완료(이팝나무 등 27,197본)

‧ 명상숲 조성, 복지시설 나눔숲 조성, 주민참여형 마을정원, 통학로 녹지 조성,     전군도로 벚꽃길 조성, 종합경기장 교통섬 정원, 호남제일문 마중길 띠녹지 조성

- 6개 사업 추진 중 : 도로변 가로정원 등 6개 사업

○ '21년 도시숲 사업대상지 조사, 검토 등 사업준비    : '20. 7.∼11.

□ 금후계획

○ 2020 도시숲 사업 추진 완료                       : '20. 12.

천만그루조성팀

도시 바람길숲 조성

○ 도시 외곽의 깨끗하고 신선한 공기를 도심으로 끌어들여 대기정체      해소 및 공기순환 촉진을 통한 열섬현상 완화와 미세먼지 저감으로      쾌적하고 살기 좋은 생활환경 조성

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 전역

- 연결숲 : 백제대로, 기린대로, 장승배기로

- 디딤·확산숲 : 학교 3, 관공서 3, 아파트 녹지 2, 보행자전용도로 4개소 등

○ 사업규모 : 20ha

○ 사업기간 : 2019. 1. ∼ 2022. 12.(4개년)

○ 총사업비 : 20,000백만원(국비 10,000 시비 10,000 )

○ 사업내용 : 도심열섬현상 완화 및 미세먼지 저감 등을 위한 도시 바람길숲 조성

바람생성숲		디딤숲·확산숲		연결숲		도시내 맑은 공기 순환
(도시외곽 산림)		(도시내 거점숲)		(바람생성숲,거점숲 연결)
조림·숲가꾸기 등		도시 거점숲, 옥상·벽면 등 녹화		하천, 가로수 병렬식재 등 녹지축 연결

□ 추진상황

○ 중기지방재정계획 및 지방재정 투자 심사(중앙심사)   : '19. 1.∼3.

○ 전문가 자문(과업지시서, 제안서 등)               : '19. 2.∼5.

○ 협상에 의한 계약 등 행정절차 이행               : '19. 7.∼9.

○「도시 바람길숲 조성 기본 및 실시설계용역」추진      :  '19. 10.∼'20. 9.

- 일시중지('20. 9. 8.) : 행정절차 기간소요

○ 착수 보고회 및 산림청 자문단 현장 컨설팅 개최   : '19. 11. 7.

○ 시민단체, 전문가, 용역업체 연구진 등 워크숍 개최  : '19. 12.

○ 바람길숲 다울마당(6회), 중간보고(1차), 전문가 자문 등  : '20. 2.∼9.

○ 도시림위원회 심의, 일상감사 등 행정절차 이행          : '20. 10.∼11.

□ 금후계획

○ 도시 바람길 숲 조성사업 발주 및 추진        : '20. 11.∼'22. 12.

천만그루조성팀

혁신도시 미세먼지 저감숲 조성

○ 날로 심각해지는 미세먼지 저감을 위해 혁신도시 내 유휴부지에

복합 기능성 경관숲을 조성하여 아름답고 청정한 전북 만들기

실현과 주민들의 삶의 질 향상 도모

□ 사업개요

○ 위    치 : 혁신도시, 만성지구 일원

○ 사업면적 : 10ha

○ 사업기간 : 2020. 1. ∼ 2022. 12.(3개년)

○ 사 업 비 : 10,000백만원(국비 5,000, 시비 5,000)

- 2020년 예산 : 1,395백만원(국비)

○ 사업내용 : 미세먼지 저감 및 열섬현상 완화를 위한 숲 조성

□ 추진상황

○ 미세먼지 저감숲 조성 관련 전라북도․산림청 협의   : '19. 11.

○ 지방재정투자심사(도) 및 중기지방재정계획         : '20. 1.∼3.

○ 예산 성립전 사용 신청                           : '20. 3.

○  기본 및 실시설계용역 추진                       : '20. 4.∼8.

○  착수보고회 및 공공기관 협의(농진청, 농과원, 한농대) : '20. 5.

○  전문가 자문, 중간보고 및 다울마당(3차) 개최       : '20. 5.∼7.

○ 도시림위원회 심의, 일상감사 등 행정절차 이행     : '20. 7.∼8.

○ 최종보고, 기본 및 실시설계용역 완료             : '20. 8.

○ '20년 혁신도시 미세먼지 저감숲 조성사업 시행      : '20. 10.∼'21. 4.

□ 금후계획

○ '21년 혁신도시 미세먼지 저감숲 조성사업 실시설계용역   : '20. 11.∼12.

정원문화산업팀

시민과 함께하는 정원문화 확산

○ 시민들이 정원을 쉽게 접하고 스스로 가꿀 수 있는 환경을 조성

하고 생활 속 정원문화를 확산함으로써 녹색복지를 실현하여 시민이

다 함께 행복해지는 천만그루 정원도시 구현

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 일원

○ 사업기간 : 2020. 1. ∼ 12.

○ 사 업 비 : 308백만원(국비 15, 시비 293)

○ 사업내용

- (정원교육) 초록정원사 양성, 정원문화특강

- (정원문화의 장) 아름다운 정원 공모전, 정원산책

- (시민참여 정원 조성) 주민참여형 어울림정원 및 쌈지정원조성

- (시민헌수) 시민의 숲 1963 조성 동참

□ 추진상황

○ 시민헌수 홍보 및 모금 추진(45개 단체, 484백만원) : '18. 11.∼'20. 11.

○ 주민참여형 어울림정원 및 쌈지정원 조성(26개소)  : '20. 1.∼11.

○ 아름다운 정원 공모전(9개소)	: '20. 4.∼6.

○ 정원문화특강 및 정원산책(각 10회)	: '20. 5.∼11.

○ 2021 꽃심, 전주정원박람회 기본계획 수립	: '20. 8.

○ 초록정원사 기본 및 역량강화과정 운영(94명)   : '20. 8.∼11.

○ 2021 꽃심, 전주정원문화박람회 지방재정투자심사	: '20. 11.

□ 금후계획

○ 2021 꽃심, 전주정원문화박람회 준비           : '20. 11.∼'21. 6.

- 작가정원 공모                       : '20. 11.∼12.

- 주박람회장 전시 공간 시공 및 설치           : '21. 5.∼6.

○ 주민참여형 어울림정원 및 쌈지정원 조성(20개소) : '21. 1.∼12.

○ 초록정원사 3기 양성(기본과정 60명)            : '21. 3.∼12.

○ 정원문화특강, 정원산책 등 정원문화확산 사업 추진   : '21. 4.∼12.

꽃도시조성팀

전주 꽃심 지방정원 조성

○ 쓰레기매립장이었던 호동골에 전주시만의 차별화된 지방정원을 조성하여      휴식 및 문화공간으로 탈바꿈시키고, 정원에서 체험·관광·교육 등이      가능한 프로그램 운영으로 시민에게 정원문화 확산 및 관광 인프라 구축

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 우아동1가 856번지 일원(아중호수 연접 양묘장 일원)

○ 규    모 : 13㏊(129,580㎡)정도

○ 사업기간 : 2021. ∼ 2023.

○ 사 업 비 : 18,200백만원(국 1,000, 도 3,000, 시 14,200)

○ 사업내용 : 3개 정원지구 14개 주제정원과 휴식 및 문화공간 조성

□ 추진상황

○ 기본구상 용역 착수	: '19. 12.

○ 다울마당 회의 개최(3회), 중간보고(2회)       : '20. 2.∼5.

○ 지방정원 명칭 등 아이디어 시민공모	: '20. 3.∼4.

○ 기본구상 용역 최종보고회 및 준공	: '20. 6.

○ 전주 꽃심 지방정원 조성 기본계획 수립	: '20. 8.

○ 지방재정투자심사(도)                        : '20. 9.∼10.

○ 공유재산심의	: '20. 10.∼11.

□ 금후계획

○ 토지 등 감정평가 및 협의매수 추진	: '21. 1.∼6.

○ '22년 생활SOC 복합화사업 신청	: '21. 1.∼8.

- 가든센터 내 작은도서관, 생활문화센터

○ 기본 및 실시설계 용역 추진	: '21. 1.∼12.

- 다울마당 및 의견수렴, 주민공청회, 인허가 등 행정절차 이행

○ 지방정원 조성 공사 시행	: '22. 1.∼'23. 12.

○ 지방정원 운영 및 아중호수연계 확대 등록	: '24. 1.∼

□ 국가정원 지정 요건 충족을 위하여 30ha 이상의 정원면적과 3년간 운영실적 필요

공원조성팀

덕진공원 전통정원화 사업

○ 덕진공원을 전주의 역사성과 정체성 등을 대표할 수 있는 전통정원으로      조성하여 한옥마을과 연계한 제2의 관광거점공간으로 육성

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진공원 연못 내

○ 사업기간 : 2016.∼2021.

○ 사업규모

- 연화교 재가설(L=284m, B=3.0m)

- 연화정(A=393.75㎡) 재건축, 창포원(A=1200㎡) 조성 등

○ 총사업비 : 9,590백만원(특교 400, 도비 1,860, 시비 7,330)

- 연화교 : 6,000백만원(특교 400, 도비 1,165, 시비 4,435)

- 연화정 : 3,500백만원(도비 650, 시비 2,850)

- 창포원 : 90백만원(도비 45, 시비 45)네

□ 추진상황

○ 연화교 재가설 실시설계 용역                   : '16.  9.∼'18. 11.

○ 연화교 경관위원회 심의(경간폭, 인도폭, 난간고)  : '17. 12. 20.

○ 연화교 행정절차 이행(일상감사, 설계자문위원회, 원가심사) 등  : '18.  4.∼7.

○ 연화교 재가설 공사(1차분/전체분) 착공           : '18. 11. 28.

○ 연화교 가도설치 및 기존 교량 철거              : '19. 3. 13.

○ 연화교 1차분 준공 및 2차분 착공                : '19. 12.

○ 연화정 조성계획 변경 관련 도시공원위원회 심의  : '20. 1. 16.

○ 연화정 철거                                      : '20. 4.

○ 창포원 공사 완료                                 : '20. 6.

○ 연화정 행정절차 이행(도 원가심사, 시 일상감사)  : '20. 6.

○ 연화정 공사 발주 및 착공                       : '20. 10.

□ 금후계획

○ 연화교 전체분 준공                                : '20. 11. 26.

○ 연화정 재건축 공사추진                            : '20. 10.∼'21. 9.

공원조성팀

장기미집행 도시공원 실효대책 추진

○ 2020년 7월 장기미집행 도시공원 일몰제 시행으로 실효 위기에 있는

“도시의 허파” 공원을 지키기 위한 효과적이고 실효성 있는 관리방안 모색

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 관내 일몰제 대상공원 15개소

○ 규    모 : 개발가능지역 2.02㎢ 매입

○ 사업기간 : 2020.∼2025.(1단계)

○ 사 업 비 : 145,000백만원('20년도 23,000백만원)

○ 사업내용 : 미집행 공원내 사유지 9.44㎢ 중 개발가능지역 2.02㎢ 우선 매입

※ 1단계 대상지 :「전주시 도시계획조례」제17조의 규정에 따라 개발행위허가의

일반적 기준(표고 75미터 미만, 경사도 15도 미만)에 제한이 없는 지역

□ 추진상황

○ 장기미집행 도시공원 관리방안 수립용역 추진     : '18. 5.∼'20. 3.

○ 시의회 도시건설위원회 간담회 개최(3회)          : '19. 2.∼9.

○ 장기미집행 도시공원 대책 협의회 개최(6회)      : '19. 5.∼'20. 2.

○ 장기미집행 도시공원 실시계획인가 용역 추진	: '19. 8.∼'20. 6.

○ 장기미집행 도시공원 관리계획 수립(최종)         : '19. 9. 10.

○ 각종 제영향평가(교통·환경·재해·문화재 등) 추진   : '19. 9.∼'20. 6.

○ 토지보상 계획공고(8개공원, 보상협의회 미대상)       : '20. 4.

※ 기린, 다가, 산성, 안행, 완산, 평화주택 1, 평화주택 2, 화산공원

○ 실시계획 고시                                      : '20. 6. 26.

○ 토지보상 계획공고(7개공원, 보상협의회 대상)          : '20. 10.

※ 인후, 천잠, 효자묘지, 가련산, 삼천, 황방산, 덕진공원

□ 금후계획

○ 공원 내 사유지 매입 추진                      : '20. 4.∼'25. 6.

산림관리팀

산림보호 및 숲 복지서비스 제공

○ 산림재해 대응체계 확립으로 산림피해를 최소화하여 소중한 산림자원 보호

○ 쾌적하고 건강한 도시산림 조성으로 다양한 산림복지서비스 제공

□ 사업개요

○ 산림면적 : 6,249ha

○ 사 업 비 : 3,347백만원

- 소나무재선충병 방제 141, 산림병해충 민간 컨설팅 7, 산불인력 및 장비 2,309,

학산치유의 숲 · 완산칠봉 한빛마루 공원 조성 60, 유아숲체험원 운영‧조성 370, 산림휴양 인권숲 조성 및 등산로 유지관리사업 460

○ 추진사업

- 소나무재선충병 방제 : 190ha, 산림병해충 민간 컨설팅 : 1식

- 산불인력 및 장비 : 149명(감시‧진화), 4,072점(진화차량, 감시카메라, 무전시스템 등)

- 유아숲체험원 운영‧조성 : 4개소(운영 3, 신규조성 1)

- 등산로 유지관리사업 : 기린봉 등 10km, 산림휴양 인권숲 조성 : 1개소

- 학산치유의 숲 및 완산칠봉 한빛마루 공원 조성 : 타당성 및 기본계획 용역 각 1식

□ 추진상황

○ 소나무재선충병 방제사업 추진(190ha, 1,310본 제거)      : '20. 1.∼5.

○ '20년 봄철 산불방지 대책본부 운영              : '20. 2. 1.∼5. 15.

○ '20년 유아숲체험원 실시설계용역               : '20. 3.∼6.

○ 등산로 유지관리사업(학산, 기린봉 등산로) 추진  : '20. 3.∼12.

○ 산림휴양 인권숲 조성(데크길 151m, 덕진체련공원 편백숲)  : '20. 5.∼7.

○ 학산치유의 숲 기본구상 용역 추진              : '20. 7.∼11.

- 기본타당성 용역 완료('20.6.)

○ 완산칠봉 한빛마루 기본계획 용역 추진               : '20. 7.∼11.

○ '20년 유아숲체험원 조성(서부제4공원, 1ha)       : '20. 7.∼12.

○ 등산로 정비사업 추진(화장실 2개소, 10km정비)   : '20. 7.∼12.

□ 금후계획

○ '20년 가을철 산불방지 대책본부 운영           : '20. 11. 1.∼12. 15.

건 축 과  소 관

□	효율적인 옥외광고물 관리로 쾌적한 도시경관 조성	----	26
□	노후 공동주택 관리비용 지원사업	----	27
□	주민참여예산 지원사업	----	28
□	소규모 공동주택 관리비용 지원사업	----	29
□	2030 도시·주거환경정비기본계획 수립	----	30
□	재개발·재건축 정비사업		31
□	재개발 해제지역 도시재생 뉴딜사업	----	32
□	3단계 도시주거환경개선 사업	----	33
□	동산동 우리 마을 가꾸기 사업	----	34
	지역건축안전센터 운영	----	35

광고물행정팀

효율적인 옥외광고물 관리로 쾌적한 도시경관 조성

○ 옥외광고물의 체계적이고 효율적인 관리로 불법광고물을 최소화하여
깨끗한 도시경관 개선과 선진광고문화 정착

□ 사업개요

○ 기   간 : 연 중

○ 대   상 : 주요도로변 등에 무단 설치된 불법유동광고물

○ 내   용 : 현수막 등 불법 유동광고물 정비를 통한 쾌적한 도시경관 조성

□ 추진상황

○ 불법 유동광고물 정비

(’20년 10월말 기준)

정비실적(건)						행정처분(건/천원)
계	현수막	입간판	벽보	전단	에 어 라이트	계	이행 강제금	과태료
241,335	107,350	498	56,978	75,927	582	179 (218,981)	-	179 (218,981)

○ 공공 및 정당 현수막 등 옥외광고물 설치 자제 협조요청	: 2회

○ 설, 개학기 학교주변 등 취약시기별 불법광고물 일제정비 실시	: 7회

□ 문제점 및 대책

○ 주말 및 야간 이용 게릴라식 분양광고 불법광고물 게첩

□ 불법광고물 게첩에 대한 과태료 부과 강화 등 강력한 행정조치

○ 공공목적의 공사, 교통안내, 선거관련(옥외광고물 관리법 적용배제 대상)

현수막에 대한 광고물 단속 형평성 논란

□ 시·산하기관 사업부서 및 선관위 등 공공목적 현수막 실명제 적용, 상시 관리체계 구축

□ 금후계획

○ 문화 축제·연말연시·설 등 취약시기별 불법광고물 일제정비

○ 토·일(공휴일) 불법광고물 단속 실시

공동주택팀

노후 공동주택 관리비용 지원사업

○ 주거환경이 열악하고 자체관리 능력이 부족한 노후공동주택에 대해
관리비용 일부를 지원하여 주거환경개선 및 서민 주거안정 도모

□ 사업개요

○ 지원근거 : 공동주택관리법 제85조 및 전주시 주택조례 제4조

○ 사업대상 : 20년 이상 노후공동주택 총 398개단지 중 30개 단지

○ 총사업비 : 600백만원(시 100%)

○ 지 원 액 : 단지별 사업비의 70% 이하로서 2,000만원 이하 보조

○ 사업내용 : 부대시설 등 시설물 보수비용 일부지원

- 노후공동주택 시설물 보수비용 지원       : 26개단지 정도

- 경비원 등 근로자 휴게시설 설치 지원     : 4개단지 정도

○ 사업기간 : 2020. 1. ∼ 12.

□ 추진상황

○ '20년 노후공동주택 관리비용지원사업 시행계획수립    : '19.12.30.

○ 노후공동주택지원 심사위원회 개최 및 대상단지 선정 : '20.02.28.

- 24개 단지 선정(계획 30개 단지, 6개 단지 미달)

○ 지원대상단지 사업 추진 및 추가단지 접수 홍보      : '20.03~

○ 노후공동주택 추가단지 접수 및 선정(1~3차)          : '20.04~07

- 4개 단지 선정(노후공동 3개 단지, 경비원 휴게시설 1개 단지)

○ 노후공동주택 지원사업 추가모집 통보(양구청)       : '20.08.10.

※ '20.10.31 현재 실적(접수 28개소 중 25개 완료, 보조금 79.2% 집행)

사업신청 미달로 20년도 총 사업비 6억 중 64백만원(10.8%) 미집행

□ 금후계획

○ 지속 추가모집 독려(양구청)                        : '20.11~

○ 노후공동주택 사업정산 실시	: '20.12.

공동주택팀

주민참여예산 지원사업

○ 노후 된 주민 공동 이용시설 관리비용 지원을 통한 공동주택 주민 편익증진 및 전주시 도시미관 개선에 기여

□ 사업개요

○ 지원근거 : 공동주택관리법 제85조 및 전주시 주택조례 제4조

○ 사업대상 : 10년 이상 노후공동주택 총 491개 단지 중 84개 단지

○ 사 업 비 : 1,880백만원(도 80%, 시 20%)

○ 지 원 액 : 단지별 총 공사비의 70% 이하(최대 3,000만원)

○ 사업내용 : 노후 주민공동이용 시설 등 관리비용 지원 및 개선

○ 사업기간 : 2020. 1. ∼ 12.

□ 추진상황

○ 전북도 지역밀착형 주민제안 공모계획 협조(기획예산과)    : '19.10.01.

○ 지역밀착형 주민제안 공모계획에 따른 신청	: '19.10.

○ 시·도 주민참여예산위원회 심의	: '19.10.

○ 확정내시 및 보조금 교부신청 안내(도 주택건축과)        : '20.01.22.

○ 보조금 교부신청서, 사업계획서 제출(시→도)             : '20.02.17.

○ 도비보조금 교부결정 및 송금(도→시)                   : '20.03.04.

○ 주민참여예산 지원사업 추진(시→구)                    : '20.03.09.

※ '20.10.31 현재 실적(접수 84개소 중 75개 완료, 보조금 86.7% 집행)

미집행 9개 단지중 4개 단지는 올해 집행완료, 5개 단지는 이월 예상됨

□ 금후계획

○ 사업추진 및 준공정산	: '20. 12.

건축정책팀

소규모 공동주택 관리비용 지원사업

○ 자체관리 능력이 부족한 소규모 노후 공동주택의 관리 비용의 일부
지원으로 열악한 주거환경을 개선하여 서민 주거생활 안정 도모

□ 사업개요

○ 지원근거 : 전주시 소규모공동주택 관리에 관한 지원 조례

○ 사업대상 : 20년 이상의 노후된 4세대 이상 19세대 이하 소규모    공동주택(총 165개단지 중 5개 단지)

○ 사 업 비 : 100백만원(시 100%)

○ 지 원 액 : 단지별 사업비의 80% 이하로서 2,000만원 이하 보조

○ 사업내용

- 소규모 공동주택 부대시설 및 옥상부분 등 유지․보수비용 지원

- 석축․옹벽․절개지 등 긴급 보수가 필요한 사업비 지원

○ 사업기간 : 2020. 1 ∼ 12.

□ 추진상황

○ 전주시 소규모공동주택 관리에 관한 지원 조례 개정 : '20. 1.

- 20년이상 노후된 4세대 이상 19세대 이하 공동주택

○ 지원대상단지 홍보·신청 및 심사(시→구)	: '20. 1.∼ 2.

- 총 6개 단지 신청(완산 3, 덕진 3)

○ 노후공동주택 심사위원회 개최 및 대상단지 선정	: '20. 2. 28.

○ 지원단지 사업 시행 및 정산	: '20. 5.∼12.

- 총 6개 단지 지원 선정

※ '20.10.30 현재 실적(6개소 중 5개 완료, 73.3% 집행)

□ 금후계획

○ 사업추진 및 준공정산	: '20. 12.

주택재개발팀

2030 도시·주거환경정비기본계획 수립

○ 기 수립된 2020 전주시 도시·주거환경정비기본계획의 법정 재정비 주기 도래

○ 도시·주거환경정비와 관련된 제반 관련 법규의 개정, 변경 및 여건 변화에
따라 2030 전주시 도시·주거환경정비기본계획의 변경 수립 필요

□ 사업개요

○ 공간범위 : 전주시 도시지역 내 구 시가지 일원(13,668,000㎡)

○ 용역기간 : 2019. 6. ∼ (착수일로부터 12개월, 20. 3. 용역중지)

○ 용역금액 : 584백만원(도시․주거환경정비기금)

○ 법적근거 : 도시 및 주거환경정비법 제4조에 따라 10년 단위 수립

○ 주요내용

- 전주시 특성을 고려한 정비방향 제시, 건축물의 밀도계획 등

- 기존 정비예정구역 존치 또는 해제와 해제지역의 종합관리계획

□ 추진상황

○ 2030 기본계획 수립용역 업체선정 및 착수       : '19. 3. ∼ 6.

○ 기초자료 수집 및 여건 분석                    : '19. 6.

○ 정비예정구역 해제 시 관리방안 마련 검토       : '19. 10.

○ 신규(재건축) 정비예정구역 대상지 조사 및 검토   : '19. 11.∼'20. 2.

○ 용역 일시 중지(코로나19 확산 방지)             : '20. 3. ∼

- 코로나19 확산 방지를 위한 주민설명회 등 추진일정 연기

□ 금후계획

○ 해제 예정 대상지 주민 설명회 및 주민공람	: '21. 1. ∼

○ 의회 의견청취·도시계획위원회 심의                 : '21. 3. ∼

주택재개발팀

재개발·재건축 정비 사업

○ 노후불량주택 개량 및 정비사업 추진으로 도시기능을 회복하고
주거환경개선으로 도시환경 및 주거생활의 질을 높이고자 함

□ 사업개요

○정비(예정)구역 : 29개소(재개발 14, 재건축 15)

구 분		추진위 미구성	추진위 구 성	정비구역 지 정	조합설립 (시공사선정)	사업시행 계획인가	관리처분 /착공	공사완료
합계	29	6	5	1	4	3	6	4
재개발	14		전라중일원, 병무청, 효동,, 성황당, 동부시장		하가	기자촌 종광대2 동양@인근	바구멀1, 태평1, 효자 감나무골	물왕멀
재건축	15	송천롯데, 세원거성, 거성·한성·부광,,삼천쌍용2, 개나리, 송천무지개		세경	효자주공 삼천주공3 오성대우		우아주공1 삼천쌍용	삼천주공2, 우진태하, 우아주공2

□ 추진상황

○ 사업추진 부진 구역 해제(21개구역)	: ’12. 7. 2.∼’16. 12. 30.

- 태평2, 학암, 쌍용, 반촌, 숭실실고북측, 전주여고일원, 기자촌2, 전주교대인근, 강당재, 월곡, 반월, 문화촌, 다가, 덕진구청 인근, 이동교, 신우@, 진북, 인후, 동초교북측, 낙원@인근, 서원초일원

○ 전주시 도시 및 주거환경정비 조례 개정	: ’17.  4. 28.

- 정비(예정)구역 직권 해제 시 사용비용 보조 등

○ 재개발, 재건축정비사업 행정절차 추진(17개구역)	: ’19년 이전

- 정비구역 지정(오성대우, 삼천주공3), 조합설립인가(종광대2,동양@인근,기자촌,삼천,쌍용, 효자주공), 사업시행계획인가(감나무골), 관리처분계획인가(태평1,효자,우아주공1), 착공 및 분양(바구멀), 준공인가(물왕멀,우진·태하,삼천주공2, 우아주공2)

○ 재개발, 재건축정비사업 행정절차 추진(11개구역)             : ’19년

- 정비구역 지정(하가, 세경), 조합설립인가(삼천주공3), 사업시행인가(기자촌, 종광대2, 동양@인근), 관리처분계획인가(삼천쌍용), 착공 및 분양(우아주공1, 효자, 태평1)

○ 재개발, 재건축정비사업 행정절차 추진(7개구역)	: ’20. 1. ∼ 현재

- 추진위원회 구성(세경), 조합설립인가(하가, 오성대우), 관리처분계획인가(감나무골), 착공(삼천쌍용), 해산(우아주공2, 우진태하)

□ 금후계획

○ 사업추진 구역은 행정절차 등 민원신청 시 신속 민원처리

○ 공사 중 사업현장 지도감독 강화로 소음·분진 등 주민피해 최소화

하도급관리팀

재개발 해제지역 도시재생 뉴딜사업

○ 노후화가 가속되고 있고, 생활편의시설이 열악한 주거 밀집지에
대한 도시재생 뉴딜사업 추진으로“주민 삶의 질”개선

□ 사업개요

○ 대 상 지 : 인후/반촌 정비사업 해제구역 일부(A=91,165㎡)

○ 용 역 비 : 20백만원(도시재생과 149백만원 별도)

○ 용역기간 : 2019. 4. ∼ 2021. 1.

○ 용역내용

- 주거지지원형 사업대상지 현황 조사 및 사업계획 수립

- 인후/반촌지역 도시재생 활성화계획 수립

- 국토부 주거지지원형 도시재생 뉴딜사업 공모절차 이행

□ 추진상황

○ 도시재생 활성화계획 수립 용역 착수               : '19.  4.

○ 활성화계획(안) 공청회 및 시의회 의견청취	: '19. 7. ~ 8.

○ '19년 하반기 국토부 공모 신청(광역평가)-미선정     : '19.  8.

○ '20년 하반기 국토부 공모 신청(중앙평가)	: '20.10.12.

○ 종합평가(지자체 발표)	: '20.11.09.

□ 문제점 및 대책

○ '20.6월 공모 신청 가이드라인 변경으로 사업부지 先확보(60%이상) 필요

□ 거점시설부지(76.4%)에 대한 부지확보 선행(’20.매매계약, ’21.보상금 지급)

□ 금후계획

○ 활성화계획 변경(안) 공청회 및 시의회 의견청취	: '20. 11.

○ 국토부 공모 평가 및 도시재생특위 선정 발표	: '20. 12.

○ (공모선정시) 도시재생 뉴딜사업 추진	: '21년 ~ '24년

※ 공모 선정 이후 투자계획

○ 총 178.7억원(국비 100, 도비 16.7, 시비 50, HUG 12)

* HUG : 주택도시보증공사 도시기금

하도급관리팀

3단계 도시주거환경개선 사업

○ 도시 저소득주민 집단거주, 노후·불량건축물 과밀지역에 대해
기반시설을 정비하여 안전한 주거공간 확보와 정주여건 개선

□ 사업개요

○ 대 상 지 : 2개 구역(풍남초교 인근, 강당재)

○ 총사업비 : 66.4억원(국비 33.2, 시비 33.2)

(단위 : 백만원)
구분	총투자 규 모	기투자	이후 투자계획		비고
		2018년까지	2019년	2020년
계	6,636	6,636	-	-	이월계속사업비 824백만원
국 비	3,318	3,318	-	-
시 비	3,318	3,318	-	-

○ 사업기간 : 2014년 ∼ 2021년

○ 사업내용 : 기반시설 확충 및 정비

- 도로개설 5개소(L=561m, B=4~10m), 주차장 5개소, 공원 2개소 등

□ 추진상황

○ 도활사업 공모 2개 구역 선정(국교부)	: '13. 10.

○ 지방재정 투‧융자심사 완료	: '13. 11.

○ 정비계획 수립 및 정비구역지정 도시계획위원회 심의	: '14. 12.

○ 정비계획 수립 및 정비구역지정 고시	: '15.  3.

○ 정비계획 사업시행계획서 고시	: '15.  4.

○ 정비구역별 공사 추진	: '17. 8. ~ '20. 4.

- 풍남초교 인근 준공('19. 11.) / 강당재구역 준공('20. 4.)

□ 금후계획

○ 강당재구역 잔여 보상 및 추가사업 발굴 추진	:'20.11. ~ '21. 6.

- 도로 편입부지 보상 2건

하도급관리팀

동산동 우리 마을 가꾸기 사업

○ 주거지재생으로 지역주민에게 최소한의 기초생활 수준 보장

○ 정주여건 개선을 통한 주민커뮤니티 회복 및 지역역량 강화

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 여의동2가 610-1번지 일원(A=33,765㎡)

○ 총사업비 : 57.4억원(국비 23.7, 시비 33.7)

(단위 : 백만원)
구 분	총투자 규 모	기투자	이후 투자계획		비고
		2019년까지	2020년	2021년
계	5,736	4,736	1,000	-	국비 교부 완료 이월계속사업비 824백만원
국 비	2,368	2,368	-	-
시 비	3,368	2,368	1,000	-

○ 사업기간 : 2016년 ∼ 2021년

○ 사업내용

- 도로 4개 노선(L=491m, B=4~8m), 주차장 1개소(1,900㎡)

- 공원 2개소(1,904㎡), 공동이용시설 2개소(1,255㎡) 등

□ 추진상황

○ '16년 도시활력증진개발지역 공모사업 선정(국토부)	: '15.  5.

○ 정비계획 및 정비구역 변경 지정 고시	: '17.  7.

○ 사업시행계획서 고시	: '17. 12.

○ 편입토지 측량, 분할 및 감정평가 완료	: '18.  6.

○ 토지 및 지장물 보상 협의 개시	: '18.  7.

○ 경관심의, 道원가심사 등 사전행정절차 이행 완료	: '19. 10.

○ 미협의 토지 수용재결에 따른 보상금 지급 완료	: '19. 12.

※ 총 41건 82필지(6,343㎡)/협의보상 34건 63필지, 수용재결 7건 19필지

○ 기반시설 확충 사업 착수	: '19. 12.

□ 금후계획

○ 사업 추진 및 완료	: '21.  9.

건축안전팀

지역건축안전센터 운영

○ 건축법 제87조의2(지역건축안전센터 설립) 및 건축물관리법 시행('20. 5. 1.)에 따른 건축물의 안전에 관한 사항과 유지관리에 따른 기술지원 등 건축물 안전에 대한 전문적인 관리체계 운영

□ 사업개요

○ 추진배경 : 건축물 화재, 지진발생 및 건축공사장에 잦은 안전사고
발생에 따른 체계적인 안전관리체계 구축 필요

○ 추진근거 : 건축법 제87조의2 및 같은 법 시행령 제119조의3

○ 사업내용 : 지역건축안전센터 운영 및 전문적인 건축 안전관리

○ 주요업무

- 건축허가 등 관련 건축기준 및 구조기준 적합성 검토 ․ 확인

- 건축공사 감리에 대한 관리·감독

- 2020 화재안전성능보강 지원 및 융자사업 추진

- 관할구역 내 건축물의 안전에 관한 사항 및 유지관리에 따른 기술지원 등

□ 추진상황

○ 건축안전팀 신설(팀장 1, 직원 1)	: '19.  7. 24.

○ 전주시 건축조례 개정	: '19. 12. 20.

○ 전문인력(건축사) 채용	: '20.  5. 18.

○ 지역건축안전센터 운영	: '20.  5.∼

○ 화재안전성능보강지원 사업추진(6동)	: '20.  5.∼

※ '20.10.30 현재 실적(6개소 중 2개 완료, 3개 공사 중, 1개 이월예정)

□ 금후계획

○ 건축물관리법 시행에 따른 건축물의 안전 및 유지관리	: '20.  11.∼

○ 전문인력(건축구조기술사) 채용 추진	: '20.  11.∼

주거복지과 소관

□	저소득층 주거급여 지원	----	37
□	주거복지 서비스 강화 사업	----	38
□	전주형 사회주택 공급 사업	----	39
□	청년 매입임대주택 공급 사업	----	40
□	저소득계층 노후주택 개보수 사업	----	41
□	도심빈집정비 주민공간조성 사업	----	42
□	빈집은행 운영	----	43
□	부도임대아파트 수선비 지원	----	44
□	저소득계층 임대보증금 지원	----	45
	저층주거지 골목길 정비사업 추진	----	46
	해피하우스 사업 내실화	----	47

주거복지정책팀

저소득층 주거급여 지원

○ 주거가 불안정한 주거 취약계층의 주거비를 지원함으로써 주거비

부담 완화로 주거안정과 주거복지 사각지대 최소화

□ 주거급여

□ 사업개요

○ 사 업 비 : 22,332백만원(임차급여 20,682, 수선유지급여 1,650)

○ 지원대상 : 소득인정액 기준중위소득 45%이하(4인 2,137천원 이하)

○ 지원내용 : 임차급여(임차료), 수선유지급여(자가가구 주택개보수)

□ 추진상황

○ 2020년 주거급여 지원

- 임차급여 : 월 15,926가구(누계 159,263가구) 19,092백만원

- 수선유지 : 173가구(경보수 130, 중보수 13, 대보수 30)

○ 주거급여 보장결정 및 급여 변동사항 처리 : 10,996건

○ 가구별 안내문 배부, 버스정보시스템, 전주다움, 통장회의 등 주민 홍보

□ 주택바우처(전주형 주거급여)

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 7. ∼ 12.

○ 사 업 비 : 50백만원

○ 지원대상 : 미성년 2자녀 이상의 다자녀가구 및 비주택 거주자(관내 1개월 이상 거주)

○ 지원기준 : 소득인정액 기준중위소득 60%이하(4인 2,849천원 이하)

○ 지원내용 : 기초주거급여 기준임대료 50%정도의 정액 지원

구 분	선정기준	대 상	지원금액(천원)						비 고
			1인	2인	3인	4인	5인	6인
주택바우처	기준중위소득 60%이하	다자녀가구 및 비주택거주자	80	90	110	120	130	150	∘주거급여와 중복지원 불가
주거급여	기준중위소득 45%이하	최저보장수준 이하 해당가구	158	174	209	239	249	291	∘기준임대료 상한으로 실제 임차료 지원

□ 추진상황

○ 주택바우처 지원 : 42가구 18백만원

○ 주택바우처 사업 홍보

- 유관단체 홍보(교육지원청, 어린이집, 지역아동센터, 드림스타트 등), 통장·자생단체 회의 등

- 차상위 복지대상자 및 미성년 2자녀 가구 홍보안내문 우편 발송

주거복지정책팀

주거복지서비스 강화 사업

○ 현장중심의 공공·민간 자원연계 체계화 및 주거복지 정책 효율성

향상으로 주거복지 사각지대 해소

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 1.∼12.

○ 사 업 비 : 250백만원(주거복지센터 150, 비주택거주자 주거상향 지원사업 100)

○ 사업내용

- 전주시 주거복지센터 운영 및 비주택거주자 주거상향 지원사업

- 전주형 주거복지 통합서비스 강화

□ 추진상황

○ 「전주시 주거복지센터」민간위탁 개소·운영	: ’20. 7.∼

- 주거복지 상담 및 정보제공 394건, 주거취약계층 사례관리 33건

- 희망홀씨 순환형 임대주택 10호 운영 : 12가구 20명 입주지원

- 주거복지 민간자원 연계 및 직접지원 24건

- 주거복지서비스 봉사단 운영 3회, 주거복지 학교 운영 4회

○ 비주택거주자 주거상향 지원 사업 추진

- 고시원·여관 등 비주택 방문조사 131개소 및 상담 335건

- 주거상향 수요 발굴 54명, 임대주택 입주 신청 43명

○ 전주형 주거복지 통합서비스 강화를 위한 전주시·LH 협약	: ’20. 8.

- (통합서비스 제공) 주거복지협의체 운영으로 주거복지 통합서비스 제공

- (노후주거공간 재생) 지역수요 맞춤형 임대주택 공급 등 협력 지원

- (사각지대 없는 맞춤형 주거복지) 주거취약계층 통합지원 및 사례관리

□ 금후계획

○ 주거복지 상담․정보제공․교육, 민간자원 연계 등 주거복지 사각지대 해소 노력

사회주택팀

전주형 사회주택 공급 사업

○ 전주시와 민간단체가 협력하여 주거약자 등의 주거비 부담완화와 주거의 안정성을 확보할 수 있는 수요자 맞춤형 사회주택 공급

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 1. ∼ 12.

○ 사 업 비 : 1,000백만원

○ 사업규모 : 민간 토지(건물) 매입을 통해 매년 1개소 이상 공급

○ 사업내용 : 민․관 공동출자 전주형 사회주택 공급

※ 시세 80% 이하 임대료, 최대 20년 임대, 단독·다가구형 사회주택 공급

□ 추진상황

○ 2020년 전주형 사회주택 공급 계획 수립	: ’20. 1.

○ 사회주택 공급 및 운영 사업시행자 공모	: ’20. 2.∼3.

○ 사회주택 공급 및 운영사업자 심사 선정	: ’20. 4.

- 청년예술인 18가구, 한국주거복지사회적협동조합
○ 공유재산 취득 심의, 감정평가, 주택 매입	: ’20. 6.∼7.

○ 공유재산 사용 허가, 주택 리모델링 공사 시행	: ’20. 8.∼

○ 2020년 전주시 사회주택 아카데미 실시	: ’20. 10.

※ 그간 공급추진 현황 : 68가구(’17년 15, ’18년 15, ’19년 20, ’20년 18)

□ 금후계획

○ 2020년 사회주택 리모델링 공사 완료	: ’20. 11.

○ 입주자 모집 및 입주	: ’20. 11.∼12.

사회주택팀

청년 매입임대주택 공급 사업

○ 높은 주거비, 취업률 감소 등으로 어려움을 겪는 청년가구에 저렴한 임대주택을 공급하여 청년층의 주거안정 및 청년인구 유입 도모

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 1. ∼ 12.

○ 사 업 비 : 1,879백만원(국비 939.6, 시비 39.6, 지방채 900)

○ 사업규모 : 청년 매입임대주택 24호

○ 사업내용 : 대학교 주변의 기존 주택을 매입하여 만 19세∼39세 무주택 청년에게 시세의 30% 수준의 저렴한 임대주택 공급

□ 공급기준

○ 매입대상 : 건령 15년 이내 단독·다가구주택, 공동주택, 주거용 오피스텔 등

○ 입주대상 : 만 19∼39세 이하 무주택 청년, 대학생 및 취업준비생

○ 거주기간 : 최초 2년, 2년 단위로 2회까지 재계약 가능(최대 6년)

□ 추진상황

○ 국토부 매입임대주택 매입계획 승인(24호)	: ’20. 1. 30.

○ 2020년 청년 매입임대주택 공급계획 수립	: ’20. 2.

○ 주택 매입 공고, 대상지 발굴 및 현지 조사	: ’20. 2.∼7.

○ 감정평가, 공유재산 취득 심의, 주택 매입	: ’20. 8.∼10.

- 전북대학교 인근 다가구주택, 2동 24가구

※ 그간 공급현황 : 45가구(’19년 21가구, ’20년  24가구)

□ 금후계획

○ 매입임대주택 리모델링 공사 추진	: ’20. 11.∼’21. 2.

○ 입주자 모집 및 입주	: ’21.  3.∼

사회주택팀

저소득계층 노후주택 개보수 사업

○ 저소득계층의 노후주택을 개‧보수하여 열악한 주거환경을 개선하고,

주거안정을 통해 주거 약자의 삶의 질 향상 도모

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 3. ∼ 10.

○ 사 업 비 : 480백만원(도비 192, 시비 288)

○ 사업규모 : 120가구 ※가구당 인건비포함 400만원 한도

○ 사업대상 : 기초생활수급자, 차상위계층 등 저소득계층

○ 사업내용 : 지붕, 창호, 도배․장판, 보일러 등 집수리 및 소방시설 설치

□ 추진상황

(단위 : 가구)

계	지붕	벽체․바닥	창호	도배․장판	건축설비	기타
179	17	11	42	74	15	20

○ 저소득계층 노후주택 개보수 사업 계획 수립	: ’20. 1.

○ 기간제 근로자 채용 공고 및 심사 채용	: ’20. 2.

○ 저소득계층 노후주택 개보수 사업 신청 접수	: ’20. 2.

○ 주택 현장실사, 재료 구입 및 개보수 공사 실시	: ’20. 3.∼10.

□ 금후계획

○ 수혜자 만족도 조사 실시	: ’20. 10.∼11.

○ 저소득계층 노후주택 개보수 사업 정산	: ’20. 12.

주거재생팀

도심빈집정비 주민공간조성 사업

○ 도심지역 내 장기간 방치되어 정주 환경을 악화시키는 빈집을       정비하여 안전하고 쾌적한 도시경관 조성 및 주거환경 개선

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 1.∼12.

○ 사 업 비 : 260백만원(도 78, 시 182)

○ 사업규모 : 13동(동당 최대 20백만원)

- 반값임대 2개소, 공공용지(주차장, 텃밭 등) 11개소

○ 사업대상 : 1년 이상 거주 또는 사용하지 않은 빈집

- 리모델링 후 5년 이상 주변시세의 반값 전‧월세 임대에 동의한 소유자

- 철거 후 3년 이상 공공용지(주민쉼터, 공용텃밭, 주차장 등)로 사용 동의한 소유자

□ 추진상황

○ 2020년도 빈집정비사업 추진계획 수립	: ’20. 1.

○ 사업대상지 신청 접수 및 대상지 선정	: ’20. 2.∼3.

○ 빈집정비 설계용역(공공용지 조성을 위한 철거공사)	: ’20. 4.∼5.

○ 빈집정비 주민공간조성 사업 추진	: ’20. 6.∼9.

- 반값 임대주택 1개소(금암동) 공급

- 주민공간조성사업 8개소 공사(공용주차장) 완료

※ 그간 추진상황 : ’08년 ∼’19년 / 141동 정비 / 사업비 1,690백만원

□ 금후계획

○ 빈집 정비사업 추가 공사 추진(반값 1, 공공용지 3)	: ’20. 11.∼12.

○ 빈집정비사업 완료 대상지 협약이행사항 점검 등 사후관리	: ’20. 12.∼

주거재생팀

빈집은행 운영

○ 도시미관과 주거환경을 저해하는 빈집에 대해 빈집 수요자에게

빈집 정보 및 연계 서비스 제공 등 체계적으로 관리

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 1.∼12.

○ 사 업 비 : 30백만원

○ 사업규모 : 소유자가 빈집은행 게재에 동의한 빈집

○ 사업내용 : 빈집 발생 억제 및 재사용을 위해 빈집 이용 수요자에게                  빈집 정보 및 연계 서비스 제공

□ 추진상황

○ 빈집은행 구축을 위한 관련기관 회의	: ’20. 1.

- 빈집은행 구축 이후 운영 방안 논의(LH, LX, 도시재생지원센터)

○ 빈집은행 등재 가능 주택 동의서 확보 및 추가자료 조사	: ’20. 2.∼3.

○ 빈집 실태조사 용역 계약 및 착수	: ’20. 3.

○ 빈집은행 구축 및 시범 운영(70호)	: ’20. 4.∼

○ ’20년도 발생된 빈집 실태조사 완료(359호)	: ’20. 9.

○ 빈집은행 추가 등록(48호)	: ’20. 10.

	《 빈집실태조사 및 빈집은행 운영 》
▪ 빈집실태조사 - 1년 이상 아무도 거주 또는 사용하지 아니하는 빈집 조사 (’18.8.~’19.8. 신규로 발생된 빈집) - ’20.3.~10. 빈집실태조사 : 조사규모 1,064호, 빈집 359호 확정, 빈집은행 48호 등재 ▪ 빈집 은행 등재 호수 : 118호 (정보공개 동의 가구) ※ ’19년 70호, ’20년 48호

□ 금후계획

○ 빈집은행 추가 등록 대상자 지속 발굴 및 운영 ‧ 관리	: ’20. 11.〜

주거재생팀

부도임대아파트 수선비 지원

○ 공공주택 특별법에 의거 LH공사가 매입한 효성 부도임대주택에 대하여      수선비를 지원함으로써 임차인 보호 및 서민주거 안정에 기여

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2016.∼2020. (5개년)

○ 사업규모 : 효성 부도임대주택 3개 단지 248호(LH국민임대주택으로 전환)

○ 사 업 비 : 600백만원

○ 사업내용 : LH공사가 매입한 효성 부도임대주택 3개 단지에 대해 5년간 주택수선비 총 3,000백만원 지원

□ 추진상황

○ 3개 단지 주택수선비 지원(시↔LH공사)	: ’20. 2.

○ 입주민 의견 수렴	: ’20. 3.

- 입주민 불편 사항 의견 수렴하여 수선 사업에 반영

○ 3개 단지 주택수선 공사 추진(LH공사)	: ’20. 3.∼11.

- 승강기 교체, 방수공사(지하주차장, 저수조), 세대 유지보수 등

《 그간 추진사항(’16~’19년) : 29.02억원 》

연차	연도	수 선 비(억원)			주 요 공 사
		합 계	전주시	LH
1	16년	7.46	6	1.46	세대 최초 개‧보수 공사, 화재 수신기 교체 등
2	17년	9.27	6	3.27	세대 일상보수, 옥상방수 공사 등
3	18년	6.15	6	0.15	세대 일상보수, 급수방식 변경공사 등사
4	19년	6.14	6	0.14	세대 일상보수, 승강기 교체·보수 등

□ 금후계획

○ 3개 단지 주택수선 공사 완료	: ’20. 11월중

○ ’20년도분 주택수선비 정산	: ’20. 12.

주거재생팀

저소득계층 임대보증금 지원

○ 무주택 저소득계층이 장기임대주택 또는 기존주택 매입임대주택에 입주할      수 있도록 임대보증금을 지원하여 주거비 부담 완화 및 주거 안정 도모

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 1.∼12.

○ 사 업 비 : 666백만원(도 266, 시 400)  ※ 도비 직접 지원

○ 사업내용 : 생계 또는 의료급여수급자가 LH, 전북개발공사에서 공급하는

장기임대주택(영구․국민임대) 또는 기존주택 매입임대주택에

입주 시 임대보증금 무이자 지원

○ 지원금액 : 가구당 20백만원 이내(계약금 본인 부담)

○ 지원기간 : 1회 2년(2회 연장 / 최대6년)

□ 추진상황

○ 2020년 임대보증금 지원 사업 계획 수립 및 공고      : ’20. 1.

○ 2020년 임대보증금 지원 현황 : 96가구, 428백만원(도 169, 시 259)

구분	계	영구임대	국민임대	매입임대
지원금액(백만원)	428	106	271	51
지원 가구	96	57	24	15

※ 그간 지원실적(’11~’19) : 1,226가구 / 5,410백만원(도비 2,161, 시비 3,249)

□ 금후계획

○ 임대보증금 지원 사업 신청 접수 및 지원

○ 공공임대주택 신청(LH)시 임대보증금 지원사업 연계 홍보

○ 임대보증금 지원기간 만료자 보증금 회수 및 대상자 관리

주거재생팀

저층주거지 골목길 정비사업 추진

○ 저층 주거지 노후주택 밀집 지역의 골목길 정비와 생활 SOC사업을      연계 추진하여 주거환경 개선, 주변 지역 활성화 등 주거지재생 구현

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 1.∼2021. 4.

○ 사업위치 : 완산구 서완산동 강당1길 일원

○ 사 업 비 : 440백만원

○ 사업내용 : 도로·우수관 정비, 담장철거, 야간조명 개선 등

□ 추진상황

○ 사업대상지 신청․접수(총21개소/완산18, 덕진3)	: ’19. 10. ∼11.

○ 신청․접수 대상지 현장조사 및 사업지 선정	: ’19. 12.

○ 사업 대상지 주민의견 수렴(주민참여 여부 및 사업방향 결정)	: ’20. 2.∼4.

○ 설계용역 시행 및 주민의견 수렴	: ’20. 5.∼9.

- 완산동 주민 골목길 정비사업 선진지 견학 (서울 장위동)

○ 지역주민의 커뮤니티공간 조성을 위한 토지 매입	: ’20. 9.

- 골목길 입구 적재된 건축 폐기물 환경정비 실시

- 골목길 정비사업과 연계하여 주민 휴식 공간 조성 예정

○ 완산동 대문ㆍ담장 시범공사(1개소) 완료	: ’20. 10.

□ 금후계획

○ 완산동 골목길 정비사업 행정절차(일상감사) 및 발주 : ’20. 11.

○ 완산동 골목길 정비사업 착수 및 완료	: ’20. 12.∼’21. 4.

해피하우스팀

해피하우스 사업 내실화

○ 해피하우스 사업의 내실화로 주거취약계층 주민의 삶의 질 향상과

건강한 주거환경 조성으로 주거복지 실현 및 마을공동체 활성화

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 1.∼12.

○ 사 업 비 : 351백만원

○ 사업규모 : 시 전지역 35개동(단독주택, 다세대 연립주택)

○ 사업내용

- 단독·다세대·연립주택 서비스(창문 부속품 및 배선기구 등 28개 품목 수리지원)

- 해충방제, 살균소독, 변기청결 등 위생서비스 실시

- 주민참여사업, 마을개선 희망사업, 주택리폼교육, 건축상담, 공구대여

○ 지원대상 : 기초생활수급자, 차상위자, 고령자, 장애인, 중위소득 60%이하 가구

□ 추진상황

○ 단독주택 등 점검․보수 서비스 실적 : 2,921세대 12,224건

서비스구분	건축설비	전기설비	클린(위생)	기타(설치지원 및 상담 등)
건 수	2,662	5,114	1,299	3,149

○ 주민참여사업 및 마을개선 희망사업 : 9개동 11개사업

○ 주택리폼교육 실시 : 4회/ 92명(도배·도색/정리수납/목공DIY/건축설비)

○ 주거복지 공공건축가 무료 건축상담 실시 : 11회/ 29명

○ 집수리용 공구 무상대여 : 4개 센터 314건

□ 금후계획

○ 동절기 주택 점검·보수 서비스 등 해피하우스 사업 추진: ’20. 11.∼12.

○ 주민참여사업 및 마을개선 희망사업 추진	: ’20. 11.∼12.

○ 해피하우스사업 주민 만족도 조사 실시	: ’20. 12.

신도시사업과 소관

□	항공대대 이전사업	----	49
□	전주대대 이전사업	----	50
□	천마지구 도시개발사업	----	51
□	에코시티 2단계 조성사업	----	52
□	전주교도소 이전사업	----	53
□	전주효천지구 효천교 설치사업	----	54
□	효천지구 연계도로 확장	----	55
□	전주역세권 복합개발사업	----	56

부대이전팀

항공대대 이전사업

○ 북부권지역의 도시발전과 주민들의 재산권 확보 및 생활권 보장 등으로 쾌적한 도시환경 조성

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014. ∼ 2018.(5개년)

○ 사업위치 : 전주시 덕진구 도도동 일원

○ 사업규모 : 300,569㎡(9.1만평 정도)

○ 주요시설 : 항공대대 2개 부대(206, 506항공대대) / 헬기전용작전기지

- 활주로, 관제탑, 정비고, 유·무개호, 통합막사, 간부숙소, 아파트(영외 매입) 등

○ 사 업 비 : 2,083억원(민자) / 추진방식 : 기부 대 양여사업

○ 사업시행 : 전주시장(민간사업자 : ㈜에코시티)

□ 추진상황

○ 국방부에 항공대대 이전 건의                       : ’14. 12.

○ 합의각서 체결(국방부 & 전주시)                      : ’15.  4.

○ 공사착공 및 준공                         : ’16. 11. ∼ ’18. 12.

○ 항공대대 이전 및 운용(송천동⇒도도동)              : ’19.  1.

○ 항공대대 건축물 준공승인                           : ’19.  4.

□ 쟁점사항 및 대책

○ 항공대대 도도동으로 이전 후 헬기 운항으로 인한 완주군 주민 소음피해 민원으로 모든 행정절차(기부 대 양여절차) 중지

○ 완주군 민원 장기화로 인한 기존 송천동 부지개발이(2단계) 지연되어 지역주민 민원 발생

※ 국방부와 협의하여 사용허가 승인 후 항공대대 관통 연계도로 임시 개통(2020.9.28.)

□ 완주군 민원 협의 설득 및 국방부와 협의하여 항공대대 기부 대 양여 절차 이행과 기존 송천동 부지개발(2단계) 추진

□ 금후계획

○ 헬기 소음민원 관련 주민협의(전주·완주 지역주민)   : ’20. 11.

○ 항공대대 기부 및 양여재산 절차이행                 : ’20. 12.

○ 송천동 기존부지 개발사업 추진                    : ’21. ∼ ’23.

부대이전팀

전주대대 이전사업

○ 북부권 도시개발에 따른 전주대대를 이전함으로써 군부대 사격소음 및

안전사고를 사전 예방하고 쾌적한 도시환경 조성

□ 사업개요

○ 이전위치 : 전주시 도도동 일원

○ 사업규모 : 314,154㎡(9.5만평)

※ 현부지면적 : 324,204㎡(9.8만평)[자연녹지 5.7만평, 덕진공원 4.1만평]

○ 주요시설 : 통합생활관, 실내방음사격장, 탄약고, 관사, 식당 등 1식

○ 사업기간 : 2012년 〜 2023년

○ 사 업 비 : 723억원(기부재산 기준))

□ 추진상황

○ 합의각서 체결(국방시설본부 & 전주시)                : ’18. 12.

- 당초 : 항공대대 → 변경 : 항공대대+전주대대 체결(전주대대 추가)

○ 기본계획 특별기술심의위원회 심의(국방부, 조건부 승인) : ’19. 8. 21.

○ 기본설계 30% 보고(전주시→국방부)                   : ’19. 12. 17.

○ 전략환경영향평가 준비서 심의 및 공람 공고           : ’20. 1. / 3.

- 조건부 승인 : 인근 군부대(항공대대) 포함 소음영향권지역 확대(1.0㎞→3.0㎞)

○ 전략환경영향평가 초안 주민설명회 시행                : ’20. 5.

- 주민설명회 : 익산(’20.5.20. 무산), 김제(’20.5.26, 무산), 완주(’20.5.27, 완료)

○ 기본설계 60% 특별기술심의(국방부, 조건부 승인)       : ’20. 9. 10.

□ 쟁점사항 및 대책

○ 전주대대 이전 부지 인접 지자체(익산, 김제시)에서 전주대대 도도동 이전 철회 요구로 민원 발생 되어 사업추진 지연

□ 인접 지자체 피해 최소화 및 지역상생발전 방안 마련하여 설득 후 사업 추진

□ 금후계획

○ 사업승인 및 행정절차 이행                     : ’20. 11. ∼ ’21.  6.

○ 공사착공 및 준공                            : ’21.  7. ∼ ’23.  6.

○ 전주대대 기부 및 양여재산 절차이행         : ’23. 12.

에코시티팀

천마지구 도시개발사업

○ 35사단 부지개발로 인한 주변지역의 도시화 및 군부대시설 노후화

○ 도시 균형발전과 난개발을 방지하고 체계적인 북부권 도시개발

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2015. ∼ 2026.(12개년)

○ 사업위치 : 덕진구 전주대대 주변 송천동․호성동 일원

○ 사업규모 : 도시개발구역 471천㎡ (일반토지 291천㎡, 전주대대 180천㎡)

○ 사업방식 : 혼용방식(수용 및 환지방식)

○ 개발방법 : 전체 일괄동시 개발

○ 사업시행 : 전주시장(전주시 & ㈜에코시티)

□ 추진상황

○ 개발행위허가 제한지역 지정고시(제한기간 5년)    : ’15. 7

○ 천마지구 도시개발사업 추진방향 검토보고        : ’19. 4.

- 사업시행 : 전체일괄시행, 행정절차 : 단계별시행, 주택공급 : 순차적・단계별 수급 조절

○ 구역지정 및 전략환경영향평가 용역 착수        : ’19. 6.

○ 천마지구 도시개발구역지정 입안                       : ’20. 3.

○ 천마지구 구역지정 시민・환경단체 간담회 개최         : ’20. 5. 19

○ 주민의견 청취 공람・공고 및 관계부서 협의            : ’20. 5.∼ 6.

○ 천마지구 도시개발사업 구역 지정․고시            : ’20. 8.

○ 천마지구 도시개발사업 상호협력 협약체결(전북개발공사) : ’20. 10.

- 사업참여 요청에 따라 천마지구 공영개발을 위해「전주시+전북개발공사」협약 체결

□ 쟁점사항 및 대책

○ 주택공급 과잉에 따른 개발계획 수립 및 덕진 공원내 군부대 이전지 생태공원화 문제

□ 우리시 정책에 부합되는 중・저밀도 개발계획수립 및 구역계 조정으로 공원・녹지비율 확충방안 강구

□ 금후계획

○ 도시개발사업 개발계획 수립 및 실시계획 인가 추진   : ’21.∼’23.

○ 토지보상 추진                                  : ’23.∼’24.

○ 도시개발사업 착공 및 준공                      : ’25.∼’26.

에코시티팀

에코시티 2단계 조성사업

○ 지역 균형발전 및 광역도시기반 구축을 위하여 도심지에 존재하는

군부대를 이전하고 북부권개발을 선도할 친환경 생태도시 조성

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2006. ∼ 2022.(1단계 ’17. 6. / 2단계 ’22. 9.)

○ 사업위치 : 덕진구 호성동․송천동․전미동 일원

○ 사업규모 : 1,988천㎡(계획인구 32,903명/13,161세대)

- 1단계 : 1,545천㎡(25,610명/10,244세대), 2단계 : 442천㎡(7,293명/2,917세대)

○ 사 업 비 : 3,684억원(민자), 1단계 2,723억원 / 2단계 961억원

○ 사업방식 : 혼용방식(수용․사용 및 환지방식)

○ 추진방식 : 기부 대 양여방식

○ 사업시행 : 전주시장(전주시 & ㈜에코시티)

□ 추진상황

○ 민간사업자 협약체결(전주시↔에코시티)           : ’06. 3.

○ 도시개발구역지정(개발계획 포함) 승인․고시	: ’12. 8.

○ 개발계획(변경) 및 실시계획수립 고시(전체)	: ’14. 2.

○ 공사 착공 및 준공(1단계)	: ’14. 9. ∼ ’17.  6.

○ 토지매각 절차(계획수립, 승인, 매각공고, 입찰/ 160필지)추진 : ’15. 6.

○ 1단계 환지확정처분 공고	: ’17. 6.

○ 206·506항공대대 이전(송천동→도도동)	: ’19. 1.

○ 2단계 문화재 발굴조사 및 토양오염 정화사업 시행	: ’19. 3. ∼ ’19. 12.

○ 2단계 부지 개발계획 및 실시계획 변경 인가․고시  : ’20. 1.

○ 2단계 부지 기반시설 실시설계 완료        : ’20. 6.

○ 2단계 구역밖 기반시설(하수도) 설치 공사 착공  : ’20. 8.

○ 2단계 임시도로(대로3-30호) 개통 및 사유지 임목・지장물 철거  : ’20. 9. ∼ ’19. 10.

□ 쟁점사항 및 대책

○ 항공대대 도도동 이전 운항 이후, 완주군 헬기소음피해 민원으로 모든        행정절차(기부 대 양여) 중지

□ 완주군 민원과 부지개발은 별도 사항임을 강조하여 국방부와 지속적인 협의 통해 2단계 부지개발 조속 추진

□ 금후계획

○ 2단계 구역밖 기반시설(하수도) 설치공사 추진          : ’20. 11. ∼ ’21. 8.

○ 2단계 부지 공사착공 및 준공	: ’20. 12. ∼ ’23. 3.

택지개발팀

전주교도소 이전․신축사업

○ 교도소 인근지역 주민들의 주거환경 개선과 서남권의 체계적인 도시정비 필요

○ 재소자 사생활 보호와 교정직원의 근무환경 개선을 위한 시설개선 시급

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2015 ∼ 2023(9개년)

○ 사업위치 : 완산구 평화동3가 작지마을 일원(현 교도소에서 300m set-back)

○ 사업규모 : 194천㎡(교정시설 188천㎡, 진입도로 6천㎡)

- 수용인원 1,500명, 건축면적 30,181㎡(26개동), 직원 465명

○ 사 업 비 : 1,500억원 정도(국비), ※시비투입 50억원(특별지원액))

○ 사업시행 : 법무부

□ 추진상황

○ 도시관리계획 결정․고시(전주시)	: ’17. 12. 22.

○ 작지마을 주민 특별지원 고충민원 권익위 합의 조정	: ’19. 10. 30.

- ①이주택지(150평/가구) 조성원가의 15%에 공급, ②생계대책용 공동작업장(텃밭 200평/세대) 대부

○ 보상업무 위‧수탁 협약 체결(전주교도소→시)	: ’19. 12. 6.

○ 토지보상비(8,795백만원) 송금(전주교도소→시)	: ’20. 2. 18 / 4. 1.

○ 이주단지 조성계획 수립 등 용역 추진	: ’20. 4. ~ ’21. 2.

- (과업내용)이주대상자 조사・검토, 생계대책 지원방안 검토, 대지조성사업계획 승인 등

○ 이주단지 실시설계 및 소규모 환경영향평가 착수	: ’20. 6. ~ ’21. 2.

○ 이주단지 조성(안) 법무부 및 이주대상자 협의	: ’20. 7. ~ 10.

○ 이주단지 위치 및 대상자 확정	: ’20. 8. ~ 11.

□ 쟁점사항 및 대책

○ 권익위 조정결과 및 주민 협의사항에 따라 이주대책 수립 추진

□ 교도소 이전 후보지 공모시 인센티브 지원계획에 따라 이주단지 공급 및 공동작업장 조성, 수익사업 추진 등에 소요되는 특별지원예산을 편성 추진

□ 금후계획

○ 이주단지 등 조성 용역(전주시) 완료	: ’21. 2.

○ 이주단지 보상 및 조성공사 추진(전주시)	: ’21. 2. ~ ’21. 8.

○ 교도소이전 실시설계용역 재착수, 사업인가(법무부)	: ’21. 1. ~ 12.

○ 이전부지 토지보상 추진(전주시)	: ’21. 6. ~ ’21. 12.

○ 공사추진(법무부)	: ’22. 1. ~ ’23. 12.

택지개발팀

전주효천지구 효천교 설치사업

○ 효천지구 준공 후 예상되는 교통량 증가에 대비한 접근도로망 확충  및 인근 생활권과의 연계 교통체계 구축으로 원활한 교통흐름 유도

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018. 1. ∼ 2021. 7.

○ 사업위치 : 완산구 효천지구 ∼용리로(삼천동2가 호순이감자탕 앞)

○ 사업규모 : 교량(L=126m, B=36.5m~43.0m) 설치

- 차도(왕복6차선, 21.5m), 보도(남측 5.0~9.5m, 북측 5.5m)

○ 사 업 비/시행자 : 154억(효천 도시개발사업 추가사업)/LH

□ 추진상황

○ 효천지구 삼천 연결교량 설치 협의(LH)          : ’15. 7.  ∼ ’17. 10.

- 협의내용 : 효천지구 추가사업으로 시행결정, LH에서 직접시행

○ 효천지구 토지평가협의회 개최(21차, 23차)      : ’16. 10. / ’18. 4.

- 교량 폭 43m, 인도가 넓은 광장형의 광폭으로 설치

○ 기본 및 실시설계 용역 추진(LH)                : ’18. 3.  ∼ ’19. 9.

- 전주시 경관위원회 심의, 공법심의, 기술심의(LH 자체시행)

○ 도시관리계획(도로) 결정(변경) 및 지형도면 고시         : ’19. 9.

○ 총괄조경과 자문의견 실시설계 반영 완료        : ’19. 11. 22.

○ 공사착공(공정율 : 55%)                        : ’20. 2.

- 교각, 교대설치 완료, 거더설치 작업중

○ 명칭제정위원회 명칭결정(효천교)               : ’20. 10. 27.

□ 금후계획

○ 공사추진                                      : ’20. 2. ∼ ’21. 7.        - 상판슬라브 타설(’21. 3.)

- 조경공사, 경관조명, 신호등 등 부대시설 설치(’21. 6.)

- 초기점검 및 준공 전 합동점검 (’21. 7.)

○ 공사준공 및 개통                            : ’21. 7.

※장마기간 강우로 공사지연 불가피함

택지개발팀

효천지구 연계도로 확장

○ 효천지구 단지개발 후 천잠로·세내로와 인접국도(21호선)의 연계 교통체계 구축으로 교통정체 해소하고 주변의 원활한 교통흐름 유도

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2017. 3. ∼ 2024. 12.

○ 사업위치 : 완산구 삼천동 세내교∼중인동 중인나들목(국도 21호선)

○ 사업규모 : 도로확장 L=3.4km, B=20~25m

- 1단계 : 해성삼거리 ~ 중인나들목(L=1.9km, B=20~25m)

- 2단계 : 세내교 ~ 삼천교 ~ 해성삼거리(L=1.5km, B=25m)

○ 사 업 비 : 338억원[공사비 178(1단계 106, 2단계 72), 보상비 150, 기타 10]

※ 효천지구 개발이익금을 재원으로 추진

□ 추진상황

○ 지방재정 투융자사업 심사‧의결(원안 의결)       : ’16. 10. 27.

○ 기본 및 실시설계 등 용역 추진              : ’17. 3. ∼’18. 11.

○ 도시관리계획(도로 등) 결정(변경)            : ’18. 4. 30.

○ 실시계획 인가 고시                         : ’19. 3. 15.

○ 편입토지 및 지장물 보상 추진                : ’19.  6. ∼

- 전체 190필지 150억원 (110필지 110억원 보상완료 / 협의율 78%)

○ 단계별 도로확장 계획수립                   : ’19. 12. 27.

○ 1단계 공사착공(공정률 : 30%)                : ’20.  4.

□ 쟁점사항 및 대책

○ 효천지구 준공 후(’19.06.11) 쑥고개로 및 국도712호선 등 교통체증

해소를 위해‘21. 12월말까지 1단계구간 공사완료가 절실하나

’21년 일반회계 예산확보 어려움

- 일반회계 55억원 지원불가, 가용재원 : 18억원(도시개발 특별회계

□ 시급구간 1단계(해성삼거리~중인나들목)에 대하여 기존도로 소통에 차질 없도록 토공 및

구조물 작업 추진하고 추경 등 예산확보 노력 경주

□ 금후계획

○ 1단계 토지 및 지장물 보상                   : ’21.  3.

○ 1단계 공사준공                             : ’21. 12.

○ 2단계 보상 및 공사추진                     : ’22.∼

택지개발팀

전주역세권 복합개발사업

○ 정부「주거복지로드맵」(’17.11.)에 따른 공공지원 민간임대주택

공급사업의 시행에 있어 市의 정책에 부합된 사업추진 유도로

구도심의 기능을 회복하고 실수요자 중심의 공공임대주택 공급

□ 사업개요

○ 사업기간 : ’18. 12. 14.(지구지정일) ∼ ’25. 12. 31

○ 위    치 : 덕진구 산정동, 우아동 3가, 호성동 1가 일원

○ 면    적 : 1,065,500㎡(322,630평)

○ 사업규모 : 계획인구 20,374인, 주택계획 7,834세대

- 민간임대 3,945, 공공임대 1,613, 분양 2,130, 단독 146

○ 시 행 자 : 한국토지주택공사(수용 또는 사용방식)

○ 근 거 법 : 민간임대주택에 관한 특별법(지정권자:국토부장관)

□ 추진상황

○ 역세권 공급촉진지구 제안/수용(LH↔국토부)	: ’18.  3. 22./4. 27.

○ 지구 지정 잠정보류/취소 요청(시→국토부)	: ’18. 10. 12./11. 30.

○ 사업취소 요청에 대한 회신(국토부→시)	: ’18. 12.  7.

○ 지구 지정 고시(국토교통부 고시 제2018-790호)	: ’18. 12. 14.

○ 조사설계 용역 추진(LH)	: ’19. 6. ∼’25. 5.

○ 지구 지정 해제 요청(시→국토부, LH)	: ’19. 10. 21./11. 22.

○ 사업추진 협조 요청(LH→시)	: ’20. 2. 11.

○ 지구 지정 해제 촉구(시→LH)	: ’20. 3. 11.

○ 국토부 市방문, 지구지정 해제 건의	: ’20. 7.  8.

○ LH 토지분할 시행 안내공문 토지주에게 발송	: ’20. 9.  3.

- 지적공부정리(토지분할) 신청안내 및 ’21년말 보상에 따른 협조 요구

□ 쟁점사항 및 대책

○ 市의 사업취소 요구에도 불구, 국토부와 LH는 사업추진이 불가피하다는 입장

□ 신도시 개발 후 기반시설 확충 등으로 추가비용 발생과 구도심 기능회복을 위해 재생사업으로 추가 예산투입 불가피한 바, 기존 도심지내에 유휴지 활용, 노후  주택 정비 등을 통해 공공임대주택 공급방안 및 사업대상지 제안

□ 금후계획(LH 계획)

○ 지구계획 작성 및 승인 신청(LH)	: ’20. 12.

○ 관계기관 협의(국토부)	: ’21.  1.

○ 보상계획 공고 및 보상 착수(LH)	: ’21. 2. ∼’20. 6.

○ 통합심의위원회 심의(국토부)	: ’21.  5.

걷고싶은도시과 소관

□	장기미집행 도시계획도로 보상	----	58
□	북부권 국도대체 우회도로(용진~우아) 건설	----	59
□	쑥고개로(국립박물관~호동마을) 조성사업	----	60
□	견훤로 교통체계(TSM) 개선사업	----	61
□	동부대로(전미교~전주천교 확장공사)	----	62
□	전라감영옛길 보행환경 개선사업	----	63
□	금암교차로 개선 및 분수정원 조성사업	----	64
□	객사길 보행환경 개선사업	----	65
□	구도심(충경로) 문화거리 조성사업	----	66
	불합리한 도로 구조개선사업	----	67
	주요 지방하천 정비사업	----	68
	전주시 걷고싶은길 통합관리	----	69

도로시설팀

장기미집행 도시계획도로 보상

○ 2020. 7월 도시계획도로의 실효(일몰제)됨에 따라 전반적인 도로관리 체계에

문제점 발생, 효율적인 관리방안으로 인가대상을 선정하여 우선       편입 토지를 매입하고자 함

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. ∼ 2025.(5개년)

○ 사 업 비 : 47,000백만원 (’20년 예산확보 : 4,000)

○ 사업내용 : 장기미집행 도시계획도로 실시설계인가 및 토지 보상

- 20개소(대로 7, 중로 13) : 완주로, 전진로, 혁신로, 동부대로, 솔내로, 여산로 등

※ 도로 101개 노선은 2020. 7. 1일자 실효고시 완료

□ 추진상황

○ 장기미집행 도시계획도로 관리계획 변경(안)수립      : ’19.  8.

○ 장기미집행 도시계획도로 실시설계용역 착수       : ’19.  8.

○ 토지 보상계획 수립(우선순위 검토)                  : ’20.  1.

○ 토지 협의보상(과학로, 완주로)                       : ’20.  5.

○ 실시계획인가 고시 완료                             : ’20.  6.

○ 장기미집행 도시계획도로 실시설계용역 완료          : ’20.  7.

□ 쟁점 및 대책

○ 장기미집행도로 20개 노선 보상이 필요하나, ’20년 예산 40억원 확보로 원활한 토지매입을 위해 연간 94억원 확보 필요

□ ’20년 예산 부족분 54억원 및 ’21년 예산 94억원 확보

□ 금후계획

○ 연차별 투자계획에 따라 보상 추진                  : ∼’25. 6.

도로시설팀

북부권 국도대체 우회도로(용진~우아)건설

○ 북부권 국도대체우회도로(용정~용진) 1단계 사업과 연결 사업으로
북부권 우회 교통망 완성⇒교통량 분산으로 시내권 교통 소통 촉진

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2016. ∼ 2026.(11개년)

○ 위    치 : 완주군 용진읍∼덕진구전진로∼완산구 색장동 (국도21호선)

○ 사업규모 : 연장 9.9㎞ (전주시 6.7㎞), 폭 12.5m (4차로 전제 2차로)

- 전주시 6.7㎞ (1공구 1.6㎞, 2공구 5.1㎞)

○ 총사업비 : 2,362억원[국비 2,062, 시비 300 (1공구 176, 2공구 124)]

○ 시행기관 : 국토교통부(익산지방국토관리청)

□ 추진상황

○ 공사 추진                                         : ’16. 10.∼

(공정율) 1공구: 68%(’16.10.~’23.6.), 2공구: 1.1%(’19.7.~’26.5.)

○ 토지 보상 추진                                    : ’18. 10.∼

(보상율) 1공구: 87.4%(165억원), 2공구: 4.8%(20억원)

※ 1공구 167필지 104,388㎡중 146필지 89,868㎡완료(87.4%)

※ 2공구 231필지 170,842㎡중 11필지 20,123㎡완료(4.8%)

□ 쟁점사항 및 대책

○ 전주시 보상지연으로 인한 2공구 공사중지(7월) 장기화로 소송제기 우려

○ 국대도 2→4차선 확장 총사업비 변경을 위한 재정사업평가위원회 11월 심의 예정(기재부)

□ 심의통과시 공사추진을 위한 ’21년 보상예산(100억원) 확보 시급

□ 금후계획

○ 잔여지 토지보상 추진(241필지/165,239㎡, 115억원)     : ’21.  1.

- 1공구 : 21필지, 14,520㎡ / 2공구 : 220필지, 150,719㎡

○ 전체구간 공사완료	: ’26.  5.

도로시설팀

쑥고개로(국립박물관~호동마을)조성사업

○ 국도21호선 나들목과 국립박물관 간 연결도로로 혁신도시, 효천지구,
개발 등으로 심각한 교통체증이 발생되어 도로확장 필요

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018. ∼ 2022.(5개년)

○ 위    치 : 완산구 효자동2가 국립박물관∼호동마을 입구

○ 사업규모 : 연장 1.18km, 폭 15~18m → 35m

○ 총사업비 : 9,000백만원 (공사비 7,200, 보상비 1,800)

- 예산확보 : 2,200백만원 (’19년이전 500, ’20년 1,700)

□ 추진상황

○ 지방재정투자심사 완료	: ’18.  2.

○ 국립박물관∼호동마을 실시설계용역 착수	: ’18. 10.

○ 행정절차(경관심의, 교통성, 환경성 실시계획인가 등) 추진	: ’19.  3.∼12.

○ 보상계획 공고 및 협의보상                      : ’20.  2.∼

- 104건/필지 1,743㎡중 16건/필지 896㎡ 보상완료(44%)

○ 관리계획(변경) 및 실시계획인가 완료             : ’20.  6.

○ 설계자문 완료                                    : ’20.  9.

□ 쟁점사항 및 대책

○ 사업비 부족으로 공사기간 장기소요 예상

□ ’21년 사업비 확보 및 공사 추진

□ 금후계획

○ 행정절차 이행(일상ㆍ계약심사, 계약심의 등)      : ’20. 11.

○ 실시설계용역 완료                              : ’20. 11.

○ 예산 확보 및 공사추진                          : ’21.  1.∼

도로시설팀

견훤로 교통체계개선(TSM) 사업

○ 견훤로(명주골네거리∼호성네거리)는 출퇴근시간대 상습적인 교통정체가
발생하고 있어 차로수 증설 및 최적 신호운영방안을 수립하여 교통
흐름 개선

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018. ∼ 2020.(3개년)

○ 위    치 : 덕진구 견훤로 일원(명주골네거리∼호성네거리)

○ 사업규모 : 연장 1.23㎞, (보도폭 축소 4.0∼7.0 → 4.0m)

- 보도축소, 차로증설(2개 차로), 신호운영체계 재수립

○ 총사업비 : 3,950백만원(시비 3,950)

□ 추진상황

○ 기본 및 실시설계용역 착수	: ’18.  5.

○ 개선방안 및 관련부서 사전협의	: ’18. 10.

○ 행정절차 완료                               : ’19. 4.∼11.

- 경관심의, 총괄조경가 자문, 설계자문, 투자심사, 일상감사 및 계약심사 등

○ 공사 착공                                   : ’19. 12.

○ 공사 일시정지(동절기)                        : ’19. 12.∼20. 2.

○ 호성로 확장구간 토지 및 지장물 보상 완료    : ’20.  4.

○ 1차분 준공(현 공정 : 70%)	: ’20.  7.

□ 금후계획

○ 잔여공정 지속 추진                          : ’20. 11.∼12.

도로시설팀

동부대로(전미교~전주천교) 확장공사

○ 에코시티 등 급속한 주변개발로 동부대로를 이용하는 차량과 보행자가
증가함에 따라 도로확장 및 인도 개설을 통해 쾌적한 교통환경 제공

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019. ∼ 2020.(2개년)

○ 위    치 : 덕진구 송천동2가 664-49 일원(전미교∼전주천교)

○ 사업규모 : 도시계획도로(대로1-11호선) 확장 L=0.21km(B=20⇒30m)

- 차로 증설(편측 2개차로), 보도 개설, 제방도로 확장 등

○ 총사업비 : 2,800백만원(도비 300, 시비 2,500)

□ 추진상황

○ 중기지방재정계획 반영                         : ’18.  9.

○ 자체투자심사 반영                             : ’19.  6

○ 실시설계용역 착수                             : ’19.  8.

○ 사업부지 경계 및 분할 측량                    : ’19.  9.

○ 편입토지 보상 완료                            : ’19. 10.

○ 행정절차 이행 및 실시설계용역 완료              : ’19.  9.∼11.

- 경관심의, 일상감사 및 계약심사 등

○ 공사 착수(현 공정 75%)                        : ’19. 12.∼

- 가시설 및 암거box 설치 등

□ 금후계획

○ 공사 준공                                     : ’21.  2.

- 동부대로 본선부 및 제방도로 확장 등 잔여공정 추진

도로정비팀

구도심(충경로) 문화거리 조성사업

○ 구도심 공동화와 통과교통 위주의 충경로를 다양한 문화가 있고 보행
친화적인 문화거리로 조성하여 한옥마을의 외연을 확장하고 전통문화
중심의 도시재생 활성화로 도시경쟁력 제고

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018. ∼ 2022.(5개년)

○ 위    치 : 완산구 중앙동 충경로(관통로사거리∼다가교, L=0.7km, B=25m)

○ 사업내용 : 문화거리 조성 1식(도로다이어트, 인도정비, 가로수 정비 등)

○ 총사업비 : 9,000백만원 (국비 800, 시비 6,700, 기타 1,500)

- 확보액 : 1,400백만원 (’18년 100[시비], ’19년 500[시비], ’20년 800[국비])

□ 추진상황

○ 기본구상 및 타당성검토용역 (학술용역)	: ’18.  11.∼ ’19. 12.

○ 설명회 개최(대상: 충경로 차없는사람의거리 다울마당)      : ’19.  5.

○ 기본구상(안) 총괄조경가 자문(4회)	: ’19.  3.∼ 8.

▸ 특색있는 포장으로 거리 활성화 이후 차로수 조정 검토함이 적정함

○ 기본구상(안) 관련기관 자문	: ’19.  9.

▸ 왕복 4차로 유지, 차로폭 조정 적정[경찰서, 도로교통공단 등]

○ 기본구상(안) 주민설명회	: ’19. 12.

○ 기본 및 실시설계용역 착수	: ’20.  1.

○ 경관계획(안) 총괄조경가 자문(8회)	: ’20.  2.∼6.

▸ 충경로가 하나의 광장처럼 보이게 할 수 있는 바닥 포장패턴 추천

▸ 기존 가로수는 존치대상 구분하고, 가로수 개념을 벗어난 가로경관 추천

□ 금후계획

○ 단계별 공사 추진	: ’21.  5.∼

도로정비팀

금암교차로 개선 및 분수정원 조성사업

○ 기형적인 5갈래 교차로를 4갈래 교차로로 개선하여 상습정체 및
교통사고 위험 해소하고, 인간과 자연이 공존하는 아름다운‘천만그루
정원도시’조성으로 전주 이미지 개선

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2017. ∼ 2020.(4개년)

○ 위    치 : 덕진구 금암교차로 일원(태평양수영장 일원)

○ 사업내용 : 교차로 개선 1식(5지→4지), 분수광장 복원 1식 등

○ 총사업비 : 3,400백만원(국비 500, 도비 100, 시비 2,800)

- 금암광장 : 분수대(D5m) 1식, 교목 식재(38주), 블럭포장 2,555㎡ 등

- 분수광장 : 분수대(D15m) 1식, 교목 식재(39주) 등

□ 추진상황

○ 기본 및 실시설계용역 추진	: ’17. 12.∼’18. 10.

○ 금암광장 교차로 기하구조 개선사업 착수	: ’18. 10.

○ 금암광장 교차로 교통체계 변경(1차) 운영	: ’18. 12.

▸ 차량 정체현상 감소 및 진북광장 등 직·간접적 개선효과 발생

○ 총괄조경가 자문(총 33회)	: ’19.  2.∼’20. 10.

○ 금암광장 교차로 합동점검(전북경찰청, 경찰서)	: ’19.  3.

▸ 교차로 사고예방 및 보행동선을 고려 교통섬 위치 조정 검토 요구

○ 교통섬 개선안 주민설명회(4회) 및 사업계획 변경	: ’19.  5.

▸ 교통섬 위치 조정, 분수대 복원 및 수목식재

○ 경관심의 및 도시림심의	: ’19.  8.

○ 금암광장 교차로 개선공사 재착수	: ’19.  8.

○ 금암광장 교차로 교통체계 최종 변경	: ’19. 11.

○ 금암 분수정원‘식재공사’추진	: ’20.  1.∼ 9.

○ 금암 분수정원‘조성공사’추진	: ’20.  4.∼10.

○ 공사 준공	: ’20. 10.

도로정비팀

전라감영옛길 보행환경 개선사업

○ 한옥마을, 남부시장과 인접한 문화 및 상업의 중심 지역으로 보행자가
안전하고 편하게 걸을 수 있는 쾌적한 보행환경 개선을 통해
지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018. ∼ 2020.(3개년)

○ 위    치 : 완산구 중앙동, 풍남동 일원(풍남문 일원)

○ 사업내용 : 보행동선 확보, 교통정온화, 불법주정차 방지 등

- 보행자우선도로(520m)[풍남문4길외1], 보행로표시500m[풍남문2길], 주정차방지[웨딩, 차이나]

○ 총사업비 : 1,400백만원 (국비 600, 시비 800)

□ 추진상황

○ 기본 및 실시설계용역 추진	: ’18.  5.∼’19. 12.

○ 시장 상인회 간감회(3회) 및 주민설명회(3회)	: ’18.  9.∼’19.  4.

▸ 풍남문2길 일방통행 반대, 풍남문4길 일방통행 찬성

○ 풍남문4길 상인 면담	: ’19. 3. 6.∼3. 8.

○ 총괄조경가 자문	: ’19.  4.

○ 풍남문4길 상인 일방통행 반대의견 제출	: ’19.  5.

○ 사업계획 변경(안) 행정안전부 협의 및 승인	: ’19.  7.∼11.

○ 공사 계약 및 동절기 일시정지	: ’20.  1.

○ 하수도 정비사업 병행추진 협의(하수과)	: ’20.  3.∼ 5.

▸ 하수도 중복구간 본 사업에 포함하여 추진, 관급자재 하수과 지원

○ 공사 재착수	: ’20.  7.∼

▸ 불법주정차 방지 및 보행로표시 설치 완료

○ 하수과 업무협의 및 내용 반영	: ’20. 10.

□ 금후계획

○ 공사 완료	: ’20. 12.

도로정비팀

객사길 보행환경 개선사업

○ 객사길은 한옥마을과 인접하여 지속적으로 관광객이 증가되고 있는
지역으로 보행자가 안전하고 편하게 걸을 수 있는 쾌적한 보행환경
개선을 통해 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019. ∼ 2021.

○ 위    치 : 완산구 고사동 옥토주차장 일원(전주객사1길∼3길)

○ 사업내용 : 보행환경 개선 L=1.7km (5개 노선)

○ 총사업비 : 2,000백만원 (국비 1,000, 시비 1,000)

- 확보예산 : 1,014백만원 [’19년 514(국500 시14), ’20년 500(국500)]

□ 추진상황

○ 객사길 5개노선 일방통행 및 보행공간 확보	: ’18. 11.

○ 불법주정차 CCTV 8대 설치	: ’19.  3.

○ 기본 및 실시설계용역 추진	: ’19.  3.∼’20.  8.

○ 총괄조경가 자문(5회)	: ’19.  4.∼’20.  7.

▸ 특색있는 건축물 전면부는 건축물 외장재질과 유사하게 보도패턴 적용

▸ 인도폭이 넓은곳은 녹지공간을 조성후 아교목 등을 식재하여 정원거리 형성

○ 주민설명회 개최(2회)	: ’19.  5. / ’20.  6.

○ 공공조형물 설치 협의(7회)	: ’19. 11.∼’20. 10.

○ 경관심의 및 공공조형물 심의	: ’19. 11. / ’20.  9.

○ ‘민·관협의체’ 구성 및 운영	: ’20.  2.∼

○ 공사 착공	: ’20.  9.

○ 우·오수 분리사업 업무협의(하수과, 사업감리단)	: ’20. 10.

□ 금후계획

○ 우·오수 분리사업(하수과)	: ’21.  3.∼6.

○ 공사 완료(조형물 설치 포함)	: ’21. 12.

도로정비팀

불합리한 도로 구조개선사업

○ 교차로가 밀집되어있는 이동교 일원 위험도로를 구조개선하고,

교통사고 다발지역에 도로구조 개선 및 도로안전시설물 정비를

통하여 안전한 도로환경 조성

□ 사업개요

구 분	이동교 일원 위험도로 구조개선	교통사고 잦은 곳 개선
사업기간	2020.∼2021.(2개년)	2020. 1.∼12.(1개년)
위 치	완산구 이동교 일원	- 지점(4개소) : 영생고 사거리, 선너머 사거리, 효자교 사거리, 추천대교 - 구간(2개소) : 송천역 사거리∼전라고 사거리, 꽃밭정이네거리∼삼성강남@
총사업비	1,200백만원(국 600, 시 600) - ’20년 : 100(국 100)	730백만원(국 365, 시 365) - ’20년 : 730(국 365, 시 365)
사업내용	- 이동교 차로수 조정(5차로→6차로) - 교차로 선형개량 3개소 - 버스승강장 이설 - 도로 포장 및 교통시설 1식 등	- 차로 조정 - 미끄럼방지 포장 설치 - 무단횡단 방지시설 설치 - 무인단속카메라(신호,과속,주정차) 설치 등

□ 추진상황

○ 교통사고 잦은 곳 사업 대상지 선정 및 유관기관 협의      : ’19.  6.∼10.

○ 기본 및 실시설계용역(교통사고 잦은 곳)               : ’20.  1.∼ 5.

○ 기본 및 실시설계용역(이동교 일원 위험도로)	: ’20.  2.∼ 8.

○ 공사 준공(교통사고 잦은 곳, 5개소)	: ’20.  6.∼ 9.

□ 문제점 및 대책

○ 총사업비 1,930백만원 중 830백만원(국 465, 시비 365) 확보

□ 이동교 일원 위험도로 구조개선 사업의 원활한 추진을 위하여 부족분(’21년 본예산) 확보 후 공사추진

□ 금후계획

1	이동교 일원 구조개선	2	교통사고 잦은 곳 개선
◦공사 추진 : '21. 1.∼'22. 12.		◦공사 추진(영생고 사거리) : '20. 10.∼12.

생태하천팀

주요 지방하천 정비사업

○ 하천 재해로부터 인명 및 재산피해를 예방하고, 수생태 회복과 수질개선을
통해 시민에게 친수공간 제공

□ 사업개요

구 분	삼 천	아 중 천	독 배 천	금 학 천
사업기간	2011.∼2020.(10개년)	2017.∼2022.(6개년)	2014.∼2021.(8개년)	2016.∼2022.(7개년)
위 치	원당교 ~ 전주천 합류점	재전마을 ~ 소양천 합류점	용복동 일원 ~ 삼천 합류점	팔복동 전주페이퍼 ~ 전주천 합류점
총사업비 (백만원)	28,693(국․도 20,085 시 8,608) - '20년:696(국․도 483, 시 209)	30,000(국․도 15,000 시 15,000) - '20년:4,176(도 2,088, 시2,088)	29,598백만원(국․도 20,718 시 8,880) - '20년:5,922(국․도 2,089, 시 3,833)	20,544백만원(국․도 14,381 시 6,163) - '20년:1,460(도 1,022, 시 438)
사업내용	◦생태하천복원 L=9.8km, - 호안(1.8km) 정비 - 산책로(2.1km) 정비 - 수달․반딧불이 서식처 조성 - 생태학습장 조성	◦생태하천 복원 L=6.25㎞ - (상류구간) · 축제 및 호안 L = 4.7km · 교량계획 6개소, 여울 8개소 등 - (하류구간) · 교량계획 2개소, 여울 4개소 등 · 생태습지,비점오염저감시설 등	하천정비 L=5.72km, 교량 13개소, 저류지 1식 등	하천정비 L=2.2km, 교량 1개소, 배수펌프장 1개소 등

□ 추진상황

(삼  천) ○ 공사 준공	: ’20. 10.
- 호안·산책로 정비, 수달·반딧불이 서식처 조성, 매립폐기물처리, 생태학습장 조성

(아중천) ○ 아중천 1공구·2공구·조경공사 착공(공정율 4.6%)      : ’19. 12.∼

- 1공구(4.2㎞), 2공구(3.8㎞), 조경(생태습지 1식,산책로 4㎞,수목식재)

(독배천) ○ 공사 추진(공정율 72%)	: ’15. 12.∼
- 교량 10개소, 호안정비 6.1㎞, 축제정비 5.1㎞, 제방포장 5.0㎞ 등

(금학천) ○ 공사 추진(공정율 27%)	: ’18. 12.∼
- 하천 제방공사, 사면 보강공사 등

□ 금후계획

(아중천) ○ 1공구 보상완료 및 공사추진, 2공구·조경공사 공사추진  : ’20. 10.∼

(독배천) ○ 황소교, 중인교 천변저류지공사 추진 완료       : ∼’21.  4.

(금학천) ○ 하천 호안공 및 배수펌프장 공사  지속 추진     : ’20. 10.∼

걷고싶은길조성팀

전주시 걷고싶은길 통합관리

○ 우리시의 도보관광 길에 대한 데이터 구축과 통합 조정을 통해

길 간의 연계코스를 마련하고, 길마다의 지역성과 역사성에 맞는      스토리텔링을 개발하여 전주시만의 도보관광 명품길 조성

□ 현    황

○ 전주시 주요길 : 총 13개 노선 400.3km

- 조성완료 : 12개 노선 392.7km(천년전주 마실길, 삼천 마실길, 모악산 마실길, 한옥마을 둘레길,     도란도란 시나브로길, 전북 순례길, 역사탐방길, 생태길, 전주부성 옛길, 건지산 학술림 탐방길, 숲길, 전주 천년고도 옛길)

- 추 진 중 : 1개 노선 7.6km(도시 바람길숲)

○ 현 실 태 : 각 부서별로 기존 길을 조성․관리하고 있으나, 조성된

길들간의 연계성이 부족하여 활성화가 되지 않음

□ 추진상황

○ 전주시 주요길 자료 조사 및 정리	: ’20.  1.∼2.

○ 관련 전문가 자문 및 의견수렴	: ’20.  3.∼4.

○ 걷고싶은길 일제 조사(12개 코스/392.7km)	: ’20.  3.∼5.

○ 단체개발 3개코스 코스자료 협조 및 탐방	: ’20.  5.

○ 전문가와 현지답사 및 자문회의(1차)	: ’20.  6.

○ 걷고싶은길 활성화 추진계획보고	: ’20.  6.

○ 선도사업 코스(안) 결정	: ’20.  6.

○ 선도사업 현지답사 및 전문가 자문회의(2차)	: ’20.  7.

○ 선진지 견학(부안 마실길)	: ’20.  9.

○ 선도사업 기본구상용역 추진	: ’20. 10.∼12.

□ 금후계획

○ 선도사업 추진	: ’21.  1.∼ 6.

○ 걷고싶은길 조성 종합계획 수립 용역	: ’21.  1.∼12.

○ 걷고싶은길 운영 및 홍보	: ’21.  1.∼12.

시민의숲1963추진단  소 관

□	전주 종합경기장 부지재생	----	71
□	옛 대한방직 부지 관련 시민공론화위원회 추진	----	72
□	전주 육상경기장 증축 및 야구장 건립	----	73
□	전시컨벤션·호텔 건립	----	74

1963기획팀

전주 종합경기장 부지재생

○ 전주시민의 추억이 깃들어 있는 종합경기장의 정체성을 지켜내고      시민들의 다양한 욕구를 충족할 수 있는 재생사업 추진

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019. ∼ 2024.(6개년)

○ 위    치 : 전주시 덕진구 기린대로 451 일원

○ 사업면적 : 122,975㎡

- 육상경기장 39,970㎡, 야구장 19,230㎡, 기타 63,775㎡

○ 사업내용

- 시민의 숲(정원의 숲, 예술의 숲, 놀이의 숲, 미식의 숲, MICE의 숲 등)

- 전시컨벤션센터/호텔, 백화점, 미술관 건립 등

- 재생 주제별로 구역 설정, 구역별 개별사업 추진

◈ 전주 종합경기장 부지재생 기본구상(기본계획) 수립 용역

○ 용역기간 : 2019. 11. ~ 2020. 12.

○ 용 역 비 : 419,914천원

○ 과업내용 : 기초조사, 사례조사 및 벤치마킹, 시민의견수렴

도입시설 및 운영계획 구상, 건축가이드라인 제시

공간 기본배치 구상, 교통‧동선계획, 조경‧녹지계획

시설수요예측, 시설규모확정, 타당성분석 등

□ 추진상황

○ 기본구상 용역 계약 및 착수	: ’19. 11.

○ 전문가자문단 위촉 및 추진사항 보고	: ’20. 1.

○ 시민설문조사 및 시민참여단 모집	: ’20. 3. ∼ 4.

○ 시민아이디어공모 참가작품 접수 및 예선평가	: ’20. 7.

○ 시민참여단 토론회	: ’20. 10.

□ 금후계획

○ 시민아이디어공모 본선 평가	: ’20. 11.

○ 기본구상 용역 완료	: ’20. 12.

○ 행정절차 이행	: ’21. 1. ∼ 12.

- 도시관리계획 변경, 기본 및 실시설계, 각종 인허가 등

○ 사업추진	: ’22. ∼ ’24.

1963기획팀

옛 대한방직 부지 관련 시민공론화위원회 추진

○ 대규모 도심 유휴지에 대하여 시민의 적극적인 참여를 통한 사회적 합의를 도출하고 투명한 정책 결정으로 행정의 신뢰도 향상

□ 현    황

○ 위    치 : 완산구 유연로 220 일원

○ 면    적 : 14필지 / 230,565㎡

○ 용도지역 : 주거용지(도시기본계획), 공업지역(도시관리계획)

○ 소 유 자 : ㈜자광 216,464㎡(93.9%), 도 6,228㎡(2.7%), 시 7,873㎡(3.4%)

○ 사 업 비 : 180백만원 (용역비 130, 운영비 50)

□ 추진상황

○ 주민제안(지구단위계획) 신청서 제출 (토지소유자→시)  : ’18. 11.

○ 수용불가 회신 (시→토지소유자)	: ’18. 11.

- 도시기본계획 불부합, 재산관리청(전북도)의 의견 불명확

○ 정책제안서 제출 (토지소유자→시)	: ’19. 3.

- 전주‘타워복합개발’정책제안서 제출 (주민제안 신청 내용과 동일)

○ 정책제안서 변경 제출 (토지소유자→시)	: ’19. 5.

- 컨벤션센터 ⇒ 복합문화센터 혹은 문화예술의 전당 변경 제안

○ 2019년 예산결산위원회 권고	: ’19. 7.

- 대한방직관련 공론화위원회 조속히 구성 및 예산확보

○ 사전준비위원회 구성 및 운영(회의 5회 개최)     : ’20. 2.∼ 4.

○ 시민공론화위원회 구성 및 운영(회의 12회 개최)  : ’20. 5.∼

○ 시나리오워크숍 개최(3일간, 1회/1일)	: ’20. 10.∼ 11.

□ 금후계획

○ 공론조사 추진	: ’20. 11.∼12.

- 전주시민 무작위 설문조사(1,500명) 후 시민참여단(120명) 숙의 토론

○ 시민공론화위원회 권고안 제출(위원회→시)	: ’21. 1.

○ 전주시 권고안 제시(시→토지소유자)	: ’21. 2.

○ (협상 완료 시)행정절차 이행	: ’21. 3.∼ 완료시까지

※ 토지소유자의 권고안 미수용 시 사업계획 철회

경기장이전팀

전주 육상경기장 증축 및 야구장 건립

○ 노후된 현 전주 종합경기장 및 야구장 기능을 대체하고 쾌적한 체육시설을
조성하여 시민의 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019. ~ 2024.(6개년)

○ 위    치 : 전주시 덕진구 온고을로 644 월드컵경기장 일원

○ 사업면적 : 부지면적 122,958㎡

○ 사업내용

- 1종 육상경기장 1식(15,000석 연면적 11,609㎡, 준비운동장 포함)

- 야구장 1식(8,000석 연면적 10,037㎡)

○ 사 업 비 : 900억원(시비 630억원, 지방채 270억원)

□ 추진상황

○ 사업계획 변경 동의(민자→재정)	: ’15. 7.

○ 2019년 지방재정 투자심사 완료	: ’19. 7.

○ 편입토지 감정평가 및 협의 매수 추진	: ’19. 8. ~

○ 건축 설계공모 추진 및 당선작 선정	: ’19. 10.~’20. 2.

○ 건축설계용역 및 건설사업관리용역 추진	: ’20. 4. ~

○ 사업계획변경 추진(육상경기장과 야구장 배치변경)	: ’20. 6.

○ 전문가 자문단 운영	: ’20. 7. ~

- 시민 생활거점이 될 수 있는 혁신적인 경기장 조성을 위한 자문

□ 금후계획

○ 설계용역 완료	: ’21. 6.

○ 행정절차 이행 및 미협의 토지 수용절차 추진	: ’21. 1.~ 12.

○ 공사 추진	: ’22. ~ ’24.

컨벤션시설팀

전시컨벤션·호텔 건립

○ 전시‧컨벤션 인프라 구축으로 한옥마을 등 지역 관광자원과의 시너지      효과를 창출하여, 지역경제 활성화를 이끌 MICE산업 핵심기지를      조성하고자 함

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019. ~ 2025.(7개년)

○ 위    치 : 전주시 덕진구 기린대로 451 일원

○ 사업면적 : 17,800㎡

○ 사업내용

- 전시컨벤션 : 전시장 5,000㎡, 국제회의장 1실(2,000명 수용), 중소회의실 10실

- 호      텔 : 200실 이상

○ 사 업 비 : 1,300억원 정도(민자 1,297, 시 3)

○ 사업방식 : 민간자본유치(백화점 부지 장기임대에 따른 기여)

□ 추진상황

○ 임대료 및 임대기간 산정 용역 시행	: ’19. 12.∼

○ 임대부지 감정평가 협의 및 시행	: ’20. 6.∼9.

□ 금후계획

○ 임대료 및 임대기간 산정 용역 완료	: ’20. 12.

○ 타당성조사 및 지방재정 투자심사 의뢰・심의(시→행안부)	: ’21. 1.∼’22. 3.

○ 시의회 변경동의안 제출	: ’22. 4.

- 사업 계획 및 공유재산 관리계획

○ 기존 협약 해지 및 시행협약 체결	: ’22. 5.

○ 행정절차이행	: ’22. 5.∼ ’23. 5.

- 도시관리계획 변경, 기본 및 실시설계, 건축허가 등

○ 공사추진	: ’23.∼’25.