제383회 전주시의회 임시회 복 지 환 경 위 원 회

2021년도

주요업무 추진상황 보고

맑은물사업본부

보  고  순  서

□	일 반 현 황		-------	1
□	부 서 별 주 요 기 능		-------	2
□	기 본 현 황		-------	3
□	주요업무 추진계획
	○	수 도 행 정 과	-------	5
	○	급 수 과	-------	10
	○	수 질 관 리 과	-------	18
	○	하 수 과	-------	24

일  반  현  황

□ 기   구 : 4과 14팀

									맑은물사업본부
	수도행정과 (4팀)							급 수 과 (3팀)								수질관리과 (3팀)								하 수 과 (4팀)
	수도정책							맑은물공급								수질관리								하수행정
	수도요금							급수시설								수질분석								하수시설
	체납징수							누수방지								시설관리								하수정비
	계량기관리																							지하수관리

※ 서신통합센터, 누수신고센터, 계량기시험소, 사업장 15개소(취수장 1, 배수지 10, 정수장 1, 가압장 3)

□ 정‧현원

과 별		총 계	일 반 직						연구사
			4급	5급	6급	7급	8급	9급
계	정 원	84	1	4	22	28	16	10	3
	현 원	81	1	4	22	26	5	20	3
수도행정과	정 원	22	1	1	6	8	4	2
	현 원	21	1	1	6	8	1	4
급 수 과	정 원	17		1	4	7	2	3
	현 원	14		1	2	5	1	5
수질관리과	정 원	29		1	7	9	7	2	3
	현 원	29		1	10	9		6	3
하 수 과	정 원	16		1	5	4	3	3
	현 원	17		1	4	4	3	5

※ 휴직 3(육아 2, 공무상 질병 1)

※ 공무직 38명 (수도행정과 19, 급수과 15, 수질관리과 2, 하수과 2), 청경 1명(수질관리과)

부서별 주요기능

과 별	분 장 사 무
수도행정과	○ 맑은물사업본부 운영 총괄 ○ 상수도공기업 특별회계 운영 ○ 공사 및 용역 계약, 물품관리 ○ 상수도요금 조정 및 관련조례 제․개정 ○ 검침업무 운영 및 관리 ○ 상하수도요금 과징업무 전반 ○ 급수중지․개전․폐전에 따른 계량기 관리 ○ 고장․노후계량기 교체관리 ○ 계량기시험소 운영관리
급 수 과	○ 상수도 전면개량을 통한 맑은물 공급사업 ○ 상수도 중장기계획 수립․시행 ○ 비상급수계획 및 대책수립 총괄 ○ 급수공사, 상수도 증설 및 확장공사 ○ 간이상수도 유지관리업무 ○ 누수탐사 및 누수복구업무, 누수방지대책 수립 ○ 누수신고센터 운영관리
수질관리과	○ 생활용수 공급 및 공업용수 생산․공급 ○ 광역상수도 수요에 따른 수급조절 및 관리 ○ 각 사업장 구축물․건물 유지보수 및 안전관리 ○ 국가공인수질검사기관 적정운영 및 정도관리 ○ 먹는물 공동시설(약수터) 및 간이상수도 수질검사 ○ 상수도 원․정수 수질관리 및 보전 ○ 상수원보호구역 관리
하 수 과	○ 하수도정비 기본계획(변경) 수립 ○ 하수도공기업 특별회계 운영 ○ 하수관로 정비사업 ○ 하수관로정비 민간투자(BTL)사업 유지관리 ○ 마을하수도 시설 및 유지관리 ○ 하수처리장 운영관리 및 시설물 유지관리 ○ 효율적인 지하수 및 빗물이용 관리

기  본  현  황

(2021. 6.  30일 기준)

□ 급수현황

총인구 (명)	급수인구 (명)	보급율 (%)	1일 1인 급수량(ℓ)	급수전 (개)	유수율 (%)	급수량(천㎥/일)
						계	생활 용수	공업 용수
666,153	663,488	99.6	408	241,029	80.1	268	233	35

□ 상수도관

(단위 : ㎞)

총 연 장	도 수 관	송 수 관	배 수 관	급 수 관	비 고
2,800.4	17.6	57.4	1,172.2	1,553.2

□ 상수원 보호구역

구 분	보 호 구 역			구역지정일	보호시설
	면적(㎡)	상류(m)	하류(m)		안내판	표주
방수리	284,775	1,000	500	’72. 5. 5.	8	26

□ 상수원 수계별 『댐』 저수량

수 원	위 치	만수량(천㎥)	관리기관	비 고
용 담 댐	진 안 군	815,000	수자원공사	전주권광역

□ 하 수 도

구 분		처리구역 (㎢)	계획연장 (㎞)	시설연장 (㎞)	하수인구 보급율 (%)
계		202.5	2,330	1,694	98.6
합 류 식			0	401
분류식	소 계	202.5	2,330	1,293
	오수관거		1,103	770
	우수관거		1,227	523

□ 차집관로

하 천 명	연 장 (㎞)	맨 홀 (개)	환기구 (개소)	우수토실 (개소)
계	88.9	1,010	73	251
전주천 (좌, 우안)	25.3	369	37	142
삼 천 (좌, 우안)	12.3	155	18	45
금암천 (좌, 우안)	4.4	82	9	38
아 중 선	12.0	174	4	16
팔복선(공장,생활)	16.9	183	5	8
상 관 선	10.4	47		2
기타(구화천,태평로, 연화천,덕적천,중복천)	7.6

□ 하수․위생처리 시설

구 분	환 경 사 업 소	수 질 복 원 센 터
위 치	전주시 덕진구 고내천변로 58	전주시 덕진구 중동로 150
면 적	320,990㎡	30,182㎡
시설규모 (처리용량)	규 모 : 403,000㎥/일 - 1단계 : 113,000㎥ (1990년) - 2단계 : 190,000㎥ (1997년) - 3단계 : 100,000㎥ (2005년)	규 모 : 16,500㎥/일 (2015년)
부대시설	° 위생처리장(290㎘/일) : 2002년 ° 총인처리시설(403,000㎥/일) : 2015년 ° CSOs처리시설(100,000㎥/일) : 2015년

수도행정과 소관

□	정확한 자료로 신뢰받는 상·하수도 요금부과	----	6
□	코로나19 관련 상·하수도 요금감면	----	7
□	상·하수도 요금 체납 징수율 향상	----	8
□	노후 및 고장계량기 교체사업	----	9

수도요금팀

정확한 자료로 신뢰받는 상·하수도 요금부과

○  수도계량기 검침설비 구축·관리와 수용가 부과자료의 철저한 정비로

정확한 상·하수도 요금부과를 통한 신뢰받는 상수도 행정구현

□ 사업개요

○ 검침전수 : 241,059전

- 일반주택 :  81,957(완산 42,045.   덕진 39,912)

- 공동주택 : 159,072(완산 87,182.   덕진 71,890)

- 공    단 :      30(완산      4.   덕진     26)

○ 검 침 원 : 170명

- 일반주택 :  70(완산 37,  덕진 33)

- 공동주택 : 100(완산 55,  덕진 45)

○ 기준요금 : 1,290원/㎥ (상수도 720, 하수도 400, 물이용부담금 170)

※ 가정용 기준 20㎥이하

○ 부과현황

구분	합 계	가정용	일반용	대중탕용	산업용
계	50,054 271만	30,122 243만	13,613 28만	299 901	6,020 1,572
상수도	27,340 141만	19,661 126만	6,600 15만	87 340	992 145
하수도	22,714 130만	10,461 117만	7,013 13만	212 561	5,028 526

(단위 : 백만원 / 건)

※ 월 평균 부과액 : 8,342백만원(2021. 6. 30. 기준)

□ 금후계획

○ 요금 및 검침관련 직원, 검침원 직무교육 강화          : 월 1회

○ 검침원 정례 검침후 확인자료의 지속적인 관리       : 월 1회

- 업종변경, 수도계량기 고장, 누수통보 등

○ 다량 급수업소 일제점검 실시                          : ’21. 10월

- 일반용 300㎥ 이상, 대중탕용 1,500㎥ 이상 사용자에 대하여

연초 대상 선정 후 분기별 지속적인 누적관리

수도요금팀

코로나19 관련 상·하수도 요금 감면

○ 코로나19 확산으로 경제적 어려움을 겪고 있는 지역 사업체 중

‘해고없는 도시 전주’상생 선언에 동참한 업체와 가정용을

제외한 지역사회 전반의 수도요금을 감면하여 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 해고 없는 도시 상생협력 업체감면

- 근거 : 전주시 상수도 급수조례 제37조, 전주시 고시 2020-238호

- 감면업체 : 439개

- 감면기간 : 2021년 1월 부과분 ~ 2021년 6월 부과분

- 감면비율 : 상하수도 고지요금의 30%(상한선 200만원)

○ 전주형 재난지원금 - 상하수도 요금감면

- 근거 : 전주시 상수도 급수조례 제37조, 전주시 고시 2021-36호

- 감면대상 : 민간어린이집·일반·대중탕·산업용 수용가

- 제외대상 : 가정용, 공공기관(국공립시설), 산업용 지하수 등

- 감면기간 : 2021년 3월 부과분 ~ 2021년 5월 부과분

- 감면비율 : 상하수도 고지요금의 100%

□ 추진상황

구분	합 계	민간어린이집	일반용	대중탕용	산업용
계	11,669.1 79,467	55 1,249	9,585 77,941	421 210	1,608.1 67
해고없는도시	172.1 1,347	13 169	134 1,137	25 40	0.1 1
전주형 재난지원	11,497 78,120	42 1,080	9,451 76,804	396 170	1,608 66

(단위 : 백만원 / 건)

□ 기대효과

○ 생계형 소상공인·자영업자 상하수도 요금 감면으로 소득보전 및 비용경감

○ 코로나19로 인한 체감경기의 실질적인 지원으로 지역경제 회복

체납징수팀

상·하수도 체납요금 징수율 향상

○ 체납자에 대한 상시독려, 단수예고, 정수처분을 통한 체납요금 조기징수와

자진 납부의식 제고 및 상습·고액체납자 징수강화로 안정적인 세입확보

□ 과징현황 (2021. 6. 30. 기준)

(단위 : 백만원)

구 분		조정액	징수액	결 손	체납액	징수율(%)
합 계		51,981	50,068	0	1,913	96.32
상수도	계	28,474	27,396	0	1,078	96.21
	현년도	27,242	26,419	0	823	96.98
	과년도	1,232	977	0	255	79.30
하수도	계	23,507	22,672	0	835	96.45
	현년도	22,512	21,923	0	589	97.38
	과년도	995	749	0	246	75.28

□ 추진상황

○ 체납 상하수도사용료 특별징수기간 운영 : 1회 (4. 23. ∼ 5. 31.)

- 징수금액 620백만원(목표 900백만원 대비 47.1%)

○ 체납수용가 단수계고 : 3,322세대 793백만원

○ 단수처분 및 해제 : 단수 22전 360건 8백만원 (개전 11전 128건 5백만원)

○ 고액체납자 재산조회 및 재산압류 추진 : 5명 34건 40백만원

□ 금후계획

○ 하반기 체납 상하수도사용료 특별 징수기간 운영 : 2회(9월, 12월)

○ 1백만원 이상 고질체납자 부동산, 채권 등 각종 재산 압류추진

○ 2개월 이상 체납수용가 단수처분 계고장 발송    : 월 1회

○ 상하수도사용료 장기 고액체납 수용가 집중관리

- 다세대(가구)주택, 음식점, 목욕탕업, 집합상가 등

계량기관리팀

노후 및 고장계량기 교체 사업

○ 유효기간 만기 및 노후 고장 수도계량기를 지속적으로 교체하여      상수도사용료의 신뢰성을 높이고 수용가에 양질의 서비스 제공

□ 사업개요

○ 사업대상 : 30,000개소(유효기간 만기 및 고장, 동파 계량기 등)

○ 관련법규 : 계량에 관한 법률 시행령 제21조(검정·재검정의 유효기간)

※ 검정유효기간 : 계량기구경 50mm이하(8년), 50mm초과(6년)

○ 사 업 비 : 1,943백만원(구입비 893, 교체비 1,050)

□ 추진상황

○ 최근 3년 계량기교체 추진실적 : 70,400개(’18 ∼ ’20)

(단위 : 천원)

구 분		계	2018년	2019년	2020년	비고
사 업 비		4,843,824	1,453,308	1,453,308	1,937,208
교체실적	계	70,400	20,232	26,259	23,909
	유효만기	61,162	16,321	23,021	21,820
	고장 및 동파	9,238	3,911	3,238	2,089

○ 상반기 추진실적

- 계량기 교체 : 11,939개

·단독주택 7,411건(도급), 공동주택 4,528(자체)

□ 금후계획

○ 계량기 교체 공사 : 5회/년 실시(단가계약 12,600개소, 자체 5,400개소)

- 3차 ∼ 4차 교체공사(유효만기)          : ’21.  7. ∼ ’21. 11.

- 5차 교체공사(유효만기 및 동파)         : ’21. 12. ∼ ’22.  3.

○ 동절기 계량기 동파 대비 종합상황실 운영 : ’21. 12. ∼ ’22.  3.

급 수 과  소 관

□	맑은물공급사업(노후 상수관망 정비) 2단계	----	11
□	지방상수도 현대화 사업	----	12
□	스마트 관망관리 인프라 구축사업	----	13
□	노후 상수관로 정밀조사용역	----	14
□	공동주택 등 노후 급수설비 지원사업	----	15
□	서부 신시가지 출수 불량지역 가압장 설치	----	16
	평화동 꽃밭정로 노후관 갱생(관세척) 작업	----	17

맑은물공급팀

맑은물공급사업(노후상수관망정비) 2단계

○ 유수율 85%이상 향상으로 선진화된 급수체계 구축과 맑고 깨끗한      수돗물을 공급함으로써 상수도 경영합리화 및 시민이 직접 느낄수      있는 상수도 수질개선 도모

□ 사업개요

○ 사업위치 : 서신동 등 18개 블록 (1차 7, 2차 6, 3차 5)

○ 사업기간 : 2017. ∼ 2022.(6개년)

○ 총사업비 : 46,561백만원(기투자액 33,248, ’21년 5,813, ’22년이후 7,500)

○ 사업규모 : 노후관로 교체 및 블록시스템 구축

□ 추진상황

구분		연도	블록	연장 (km)	사업비	비고
계			68	776	207,761
1단계		’09. ~ ’16.	50	655	161,200	중앙동, 노송동 등15개동
2 단 계	소계		18	121	46,561
	1차	’17. ~ ’19.	7	36	10,581	효자동, 삼천동 일부
	2차	’18. ~ ’20.	6	26	10,567	우아동, 금암동, 호성동 일부
	3차	’20. ~ ’22.	5	59	25,413	서신동, 중화산동 일부

(단위 : 백만원)

※ 2단계 3차분 25,413백만원중 17,913백만원 기 확보

○ 맑은물공급사업 2단계 3차분 공사추진(공정 48%) : ’20. 4. ∼ ’22. 10.

- 1회분 정비공사 완료 (96억원 / 3블록, 32km)   : ’20. 4. ∼ ’21. 5.

□ 금후계획

○ 맑은물공급사업 2단계 3차분 공사추진           : ’20. 4. ∼ ’22. 10.

- 2회분 정비공사 추진 (38억원 / 2블록, 9km)   : ’21. 6. ∼ ’21. 9.

맑은물공급팀

지방상수도 현대화 사업

○ 인천 수돗물사건 이후 노후 상수관로에 대한 수질관리의 안전성에

기여하고자 노후 상수관로의 조기 정비 추진으로 먹는 물 안전 확보

□ 사업개요

○ 사업위치 : 상수도 미정비 60개 블록

○ 사업기간 : 2020. ∼ 2024.(5개년)

○ 사 업 비 : 484억원[국비(50%) 242, 도비(10%) 48, 시비(40%) 194]

- ’20년 예산 : 7,270백만원  ,  ’21년 예산 : 10,505백만원 ⇨ 예산 100% 확보

○ 사업규모 : 노후 상수관로 교체 및 개량(상수도 유수율 85% 이상 향상)

- 관로 교체 및 개량 L=275km, 유지관리시스템 연계 블록구축 1식

□ 추진상황

○ 수자원공사와 위·수탁사항 협의 및 협약체결     : ’19. 12.

○ 금암 급수구역 우선 사업 대상지 선정 및 조사    : ’20. 6. ∼

○ 금암 급수구역 우선 사업대상지 누수탐사 및 복구(36건)  : ’20. 6. ∼

○ 대수용가 유량조절밸브 설치(7개소)               : ’20. 10. ∼ 21. 1.

- 원대한방병원 주변 등 고지대 출수불량 해소

○ 소블록별 고립시험 시행                          : ’21. 5. ∼

-  1차 61개 블록중 11개 블록 완료

□ 금후계획

○ 1차년도 기본 및 실시설계 완료              : ’21. 5. ∼ 9.

○ 환경부 사전기술검토                        : ’21. 9. ∼ 11.

○ 우선 사업대상지(금암급수구역) 사업추진          : ’21. 11. ∼

누수방지팀

스마트 관망관리 인프라 구축사업

○ 인천 붉은 수돗물 사태 이후 먹는 물 안전관리 강화를 위한 근본적 대책

수립이 필요하여 수돗물 공급 全 과정에 감시체계를 구축 사고 발생을

사전에 방지하고, 사고 발생시 신속한 대응이 가능하도록 인프라 구축

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 전주시 스마트 관망관리 인프라 구축사업

○ 사업기간 : 2020. 1. ∼ 2021. 12.

○ 사 업 비 : 13,139백만원[국비 9,197(70%), 시비 3,942(30%)]

- ’20년 : 9,700백만원(국 7,761, 시 1,939), ’21년 : 3,439백만원(국 1,436 시 2,003)

○ 사업내용

- 수질관리시스템 구축 : 수질측정 20개소, 자동드레인 16개소 등

- 사고발생시 위기대응 구축 : RF 관로인식체계 21,000개소

- 원격검침 시스템 구축 : 원격지시부 1식, 스마트미터기 20,278전

○ 사업방식 : 한국수자원공사 위탁시행

□ 추진상황

○ 스마트 관망관리 인프라 구축 사업 확정 통보     : ’19. 10.

○ 스마트 관망관리 기본계획 수립(131억원 – 환경부)  : ’20. 3. ∼ 10.

○ 스마트 관망관리 위·수탁 협약(전주시↔K-water) : ’20. 11.

○ 세부사업 계획(안) 협의(전주시↔K-water)         : ’21. 3.

○ 세부사업 계획 환경부 승인요청 및 협의(3회)     : ’21. 4. ∼ 6.

○ 세부사업 계획 변경 승인(환경부 → 전주시)      : ’21. 6.

○ 세부사업 시행 추진 통보(전주시 → K-water)        : ’21. 7.

□ 금후계획

○ 스마트 관망관리 인프라 구축사업 기술별 발주       : ’21. 7.

○ 스마트 관망관리 인프라 구축사업 완료              : ’21.12.

급수시설팀

노후 상수관로 정밀조사 용역

○ 인천 수돗물 사건 이후 환경부 주관 시범적으로 노후 상수관로에

대한 현황을 조사하여 조기 상수도관로 정비계획을 수립하고

○ 국가주도의 전국 동일 기준의 상수관로 상태검증 및 향후 노후

관로정비사업 지원근거 필요

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 전역

○ 용역기간 : 2020. 2. ∼ 2021. 12.

○ 사 업 비 : 957백만원[국비(70%) 670, 시비(30%) 287]

○ 용역규모 : 상수관로 정밀조사(L=571km)

○ 용역내용 : 노후 상수관로 현황 및 정밀조사 용역 1식

□ 추진상황

○ 상수관로 정밀조사 대상 지자체 회의(환경부)  : ’19. 8.

○ 수자원공사와 위·수탁사항 협의 및 협약체결     : ’19. 12. ∼ 준공시

○ 노후 상수관로 정밀조사 용역 추진(수자원공사) : ’20. 4. ∼

- 관내 상수도관 제원·매설환경 간접평가 및 시료채취 등의

직접 평가 후, 노후관로 개량방안 모색

○ 기술 심의 완료                              : ’21. 6.

- 노후도에 따른 정비 대상 우선순위 결정(아중, 인후)

□ 금후계획

○ 용역 결과(사업비 산정)에 따라 환경부 협의    : ’21. 3. ∼ 8.

- 2차 지방상수도 현대화 사업대상지 선정

급수시설팀

공동주택 등 노후 급수설비 지원사업

○ 노후된 옥내 급수관의 개량에 필요한 공사비 일부를 지원하여

시민들에게 맑고 깨끗한 양질의 수돗물을 공급

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 관내

○ 사업기간 : 2021. 2. ∼ 12.

○ 사 업 비 : 60,000천원

○ 사업내용 : 노후화된 공동주택, 학교, 사회복지시설 옥내 노후 급수관 개량

○ 지원형태 : 직접수행

○ 추진근거 : 수도법 제21조 및 전주시 상수도급수조례 제39조

□ 추진상황

년 도	개 소	금액 (천원)	비고
계	18개소 (공동주택 17, 학교시설1 )	319,695
2018년	9개소 (공동주택 8, 학교시설 1)	159,910
2019년	5개소 (공동주택 5)	105,570
2020년	4개소 (공동주택 4)	54,215

○ 그간 추진실적

※ 2021년 추진실적

- 우진빌라(1,500천원) : 노후급수설비 지원사업 완료(’21. 4.)

– 거성타워아파트(20,000천원) : 개인사유로 인하여 연기신청

□ 금후계획

○ 급수설비 지원사업 홍보 및 접수                : ’21. 2. ∼ 3.

- 시 홈페이지, 전주소식지(전주다움), 일간신문, 대상지 우편발송 등

○ 지원대상자 선정 및 사업시행                   : ’21. 3. ∼ 12.

급수시설팀

서부 신시가지 출수 불량지역 가압장 설치

○ 효천지구의 도시팽창 및 사용량 증가로 인한 효자배수지 최대         공급량이 한계에 이르러 서부신시가지 일부를 팔복배수지 수계로      조정하기 위한 배수라인 가압장을 설치하여 양질의 맑은 물 공급

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 완산구 효자동 3가 산318-3번지

○ 사업기간 : 2021. 1. ∼ 8.

○ 사 업 비 : 1,400백만원 정도

○ 사업내용 : 펌프실(지하 4.0m×3.0m), 전기실(지상 4.5m×3.0m)

○ 지원형태 : 직접수행

○ 추진근거 : 수도법 제21조 및 전주시 상수도급수조례 제39조

□ 추진상황

○ 실시설계용역                                  : ’20. 6. ∼ 12.

○ 일상감사 및 계약심사 완료                     : ’21. 2.

○ 공사발주                                      : ’21. 3.

○ 공사 일시정지                                 : ’21. 5.

- 관급자재(철근) 수급 불안정에 따른 공사 진행 불가로 일시정지

□ 금후계획

○ 공사 추진 및 공사 준공                        : ’21. 8. ∼ 12.

누수방지팀

평화동 꽃밭정로 노후관 갱생(관세척)사업

○ 대성배수지 수계의 효자동 재개발 등으로 물 사용량 증가에 따른       배수지 최대 공급량이 한계에 이르러 서서학동 일대를 지곡배수지      수계로 조정하기 위한 비상관로 갱생으로 양질의 맑은 물 공급

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 완산구 평화동 1가 583-9 일원(꽃밭정로)

○ 사업기간 : 2021. 2. ∼ 10.

○ 사 업 비 : 297백만원

○ 사업규모 : 갱생(관세척)공사 1식(D 500,  L=674m)

□ 추진상황

○ 설계용역 발주                                  : ’21. 1.

○ 일상감사 등 행정절차 이행                      : ’21. 2.

○ 실시설계 완료                                  : ’21. 3.

○ 공사착공(준공예정 : ’21. 7. 9.예정)               : ’21. 5. ∼

○ 공사 일시정지(사망사고/현 공정 90%)             : ’21. 6. 28.

- L=674m 중 540m 완료(미완료 134m)

○ 경찰청, 고용노동부, 국토부(국토안전관리원) 사고조사 : ’21. 7. ∼

□ 금후계획

○ 미완료 구간 내 관로내부 확인 및 보수공법 검토  : ’21. 7. ∼ 8.

○ 3개기관 사고조사 및 조사결과에 따른 조치, 공사재개  : ’21. 7. ∼ 8.

○ 공사 준공                                      : ’21. 8. ∼ 10.

수질관리과  소관

□	노인세대 대상 찾아가는 수질검사 추진	----	19
□	깨끗하고 안전한 수돗물 공급 및 수질검사 강화	----	20
□	국가 공인 수질검사기관 효율적 운영	----	21
□	공업용수 노후 취수관 확충공사	----	22
□	대성배수지 내진 보강공사	----	23

수질분석팀

노인세대 대상 찾아가는 수질검사 추진

○ 노후 주택에서 생활하면서도 수돗물 안심확인제 및 수질민원 신청을

하지 못하는 노인세대를 직접 찾아가 수질검사를 실시하여 수돗물에      대한 불안감 해소 및 먹는물 안전성 검증으로 수돗물 신뢰도 제고

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2021. 4. ∼ 10.

○ 사업대상 : 관내 노인세대 세대(2000세대)

○ 검사항목 : 먹는물 수질기준 10개 항목

(탁도, PH, 일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군,

잔류염소, 철, 망간, 아연, 구리 등)

□ 추진내용

○ 관련부서(통합돌봄과)의 협조를 통해 명단을 파악 순차적으로 현장       방문 및 수질검사 실시

○ 수도꼭지 위생상태 점검 및 잔류염소 농도 확인 병행

○ 우리시에서 공급하는 수돗물에 대한 안전성 홍보 및 수질이상

발생시 연락처 및 대처방안 안내

□ 추진상황

○ 노인세대 수질검사 및 성적서 발송(상반기) : 718세대

□ 금후계획

○ 월 200개소 이상 시료 채수 및 수도꼭지수 위생상태 점검  : ’21. 7. ∼ 10.

○ 수질검사결과 송부 및 수돗물에 대한 안전한 음용방법 컨설팅

- 수질 이상 발생 시 연락처 및 대처방안 안내

수질분석팀

깨끗하고 안전한 수돗물공급 및 수질검사 강화

○ 과학적이고 체계적인 수질관리 및 현장행정으로 시민과 함께하는      검증 등 확인을 통한 상수도 수질안전성 확보

□ 사업개요

○ 원수 ∼ 수도꼭지수까지 공급단계별 수질검사 확대

구 분	법 적 기 준	강 화 시 행
원 수 (상수원관리규칙 제24조)	매월 COD 등 6개항목 매분기 수은 등 31개항목	매월 37개항목
정 수 (먹는물수질기준및검사등에 관한규칙 제 4조)	매일 탁도 등 6개항목 1회이상 매주 대장균 등 7개항목 매월 비소 등 59개항목	매일 6개항목 6회 매주 15개항목 매월 59개항목 분기 46개항목 추가 (분기별 105개 항목 검사)
수도꼭지수 (먹는물수질기준및검사등에 관한규칙 제 4조)	월 77개소 잔류염소 등 4개항목	월 100개소 잔류염소 등 4개항목

□ 추진상황

○ 용담호 및 고산정수장 매월 정밀검사(한국수자원공사, 전주시)

○ 수돗물 안심확인제(인터넷 접수) : 72세대 민원해결(시험성적서 배부)

○ 공동주택 방문 종합검사(깨끗한 수돗물 인증서 발급)

- ’18년(147), ’19년(156), ’20년(154)

□ 추진실적

○ 공동주택 수돗물 수질검사 및 수돗물 인증서 발급(’21.) : 79개소

□ 금후계획

○ 수돗물 안심확인제 지속추진 및 공동주택 수돗물 수질검사 실시

- 우리집 수돗물 안심확인제 : 인터넷 접수 및 시험성적서 배부

수질분석팀

국가 공인 수질검사기관 효율적 운영

○ 수질검사 공인 검사기관의 효율적인 운영을 통하여 수돗물의

파수꾼 역할과 대시민 행정 서비스 강화

□ 사업개요

○ 공인 검사기관 공공성 및 신뢰성 확보를 위한 분석능력 제고

- ’21 환경부 분석능력 평가 결과 국내 106개 기관중 우수기관 달성

○ 먹는물 및 생활속 물관리 상태 철저한 검증

- 수돗물, 약수터, 공원음수대, 수영장수, 목욕장수, 수경시설,

민방위 비상급수시설 등 안전성 조사

※ 운영인력 6명(환경연구사2, 환경3, 의료기술1)

□ 추진상황

○ ’21 환경부 분석능력평가 결과 국내 최상위 기관 선정

※ 환경부 국립환경과학원『먹는물 수질검사기관 제33호』지정 - ’00. 7

□ 추진실적

○ 먹는물 및 생활속 물상태 철저한 검증추진(2021년 총 2,364건)

- 수돗물(1,892), 약수터(12), 수영장수(22), 수돗물안심확인제(72),

목욕장수(5), 수경시설(57), 공동주택 수돗물 인증서(79),

민방위 비상급수시설(35), 기타 등(190)

□ 금후계획

○ 국제숙련도(PT) 검사 인증 추진                  : ’21. 10월중

○ 수질분석 능력 배양을 위한 자체 정도관리 강화

○ 현장방문 수질검사 서비스 강화를 통한 시민건강 증진

○ 연간 1,800여건 수질검사 의뢰 시료에 대한 신속한 처리

시설관리팀

공업용수 노후 취수관 확충 공사

○ 만경강 하천에 매설되어 있는 기존 취수 유공관의 취수량 부족

으로 확충을 통한 안정적인 공업용수 확보

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2021. 1. ∼ 12.

○ 사업구간 : 전미취수장 ∼ 팔복정수장

○ 사 업 비 : 1,000백만원

○ 사업내용 : 공업용수 취수관 설치(D=1,350mm, L=312m)등

□ 추진상황

○ 노후 취수관 교체공사 실시설계용역 발주              : ’20. 2.

○ 관련기관(익산지방국토관리청) 협의중                  : ’20. 6.

○ 공사 행정절차(일상감사 등) 이행                      : ’21. 1.

○ 소규모 환경영향평가 시행                            : ’21. 6.

□ 금후계획

○ 소규모 환경 영향 평가 준공                          : ’21. 7.

○ 공사 착수                                           : ’21. 8.

○ 공사 준공                                           : ’21. 12.

시설관리팀

대성배수지 보수 보강공사

○ 대성배수지(1·2지)의 시설물 노후화로 인한 구조물 안정성 확보        및 수질오염 방지를 위한 보수보강

□ 사업개요

○ 기  간 : 2021. 1. ∼ 12.

○ 대  상 : 전주시 완산구 대성동 대성배수지(1975년 준공)

○ 사업비 : 1,106백만원

○ 내  용 : 배수지 및 유입·유출 밸브실 보수보강 등

□ 추진상황

○ 대성배수지 정밀안전점검                             : ’20. 4.

- 정밀안전점검 결과 B등급

○ 실시설계용역(정밀안전진단 결과 반영 등) 시행         : ’20. 6.

○ 공사 행정절차(일상감사 등) 이행                       : ’21. 1.

○ 공사 착수                                            : ’21. 6.

□ 금후계획

○ 공사 준공                                           : ’21. 12.

하 수 과  소 관

□	생태도시 구현을 위한 하수관로 정비사업	----	25
□	전주 공공하수처리시설(4단계) 증설	----	26
□	농촌마을 환경개선 하수도 정비사업	----	27
□	체계적인 지하수 관리로 하수도 자주재원 확충	----	28

하수시설팀

생태도시 구현을 위한 하수관로 정비사업

○ 쾌적한 생태도시 구현과 새만금 상류 수질개선에 기여하고, 오염 부하량

저감 및 불명수 감소로 하수처리 경영 합리화

□ 사업개요

○ 위    치 : 7개 처리구역 36개분구, 6개 지구, 취락지역 54개 마을 등

○ 사업기간 : 2002년 ∼ 2035년 (34년간)

○ 사 업 비 : 895,685백만원(국비 50%, 도비10%, 시비 35%, 기금 5%)

○ 사업규모 : 하수관로정비 1,015km, 배수설비 55,720개소

□ 추진상황

○ 2020년까지 완료(62.4%, 477,549백만원) : 6개 구역

- 하수관로 정비 633.3km, 배수설비 34,498개소

○ 2021년 계속사업(23.2%, 263,256백만원) : 8개 구역

- 하수관로 정비 236.0km, 배수설비 8,219개소

(단위 : km, 백만원)

사 업 명		사업규모	총투자 규모	기투자액	2021년	2022년 이후	추진실적/계획
총 계		236	263,256	65,959	22,905	176,476
계 속 사 업 ︵ ’14 ~ ’24︶	덕진, 중앙(1) : 덕진동, 송천동	19.5	14,890	16,799	-	-	-공사중(’17. 6.~ ’21. 7월) -공정률 95%
	중앙처리(8,9,10) : 한옥마을, 공구거리	7.1	6,823	6,998	-	-	-공사중(’17. 6.~ ’21. 7월) -공정률 95%
	팔복(1,2) : 팔복동	32.6	27,947	17,694	3,147	7,106	-공사중(’19. 6.~ ’22. 12월) -공정률 55%
	중앙(9,10) : 중앙동, 풍남동, 노송동	33.7	49,780	11,397	5,117	33,266	-공사중(’20. 12.~ ’24. 12월) -공정률 10%
	중앙(8) : 중앙, 풍남동	22.3	35,610	6,405	5,142	24,063	-공사중(’20. 7.~ ’24. 7월) -공정률 12%
	화산(1,2,6,7), 아중(1) : 완산, 서학, 삼천, 평화, 효자, 우아	47.2	47,406	4,066	6,533	36,807	-설계용역 중 -행정절차이행(’21. 8.완료) -공사발주예정(’21. 9.예정)
	중앙(6,7) : 중앙동, 진북동	40.4	44,400	2,600	1,466	40,334	-설계용역 중 -행정절차이행(’21. 10.완료) -공사발주예정(’21. 11.예정)
	아중(2분구)처리구역 및 하수처리편입구역 : 상림, 호성, 반월	33.2	36,400	-	1,500	34,900	-’21년도 신규사업 -설계발주예정(’22. 6.)

□ 금후계획

○ 잔여 사업(14.4%, 154,880백만원) 계속 추진 : ∼ ’35년 까지

- 하수관로 145.7km, 배수설비 13,003개소

하수정비팀

전주 공공하수처리시설(4단계) 증설

○ 에코시티, 효천지구 택지개발 및 향후 도시개발에 따른 유입하수량

및 오염부하량 증가에 따른 공공하수처리시설 증설 필요

* 국무총리 주재 제16차 새만금위원회에서 새만금 목표수질 달성을 위한 추가 보완대책 발표(2015. 12. 4.)

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 고내천변로 58일원(전주 환경사업소 내)

○ 기    간 : 2017년 ∼ 2024년 (8년간)

○ 사 업 비 : 794억원(국비 308, 도비 154, 시비 332)

□ 추진상황

○ 전주시 하수도정비 기본계획 부분변경(증설 49,000㎥/일) 승인 : ’15. 12.

○ 예비타당성 조사 면제사업 조건부(적정성 검토) 선정(기재부)  : ’17. 2.

○ 하수처리장 증설사업 적정성 검토(KDI, 36,000㎥/일)      : ’19. 1.

○ 중앙부처(기재부, 환경부) 협의 확정(36,000㎥/일)        : ’19. 1.

○ 사업추진방침 결정(재정사업 일반공사, 전문기관 위탁)  : ’19. 12.

○ 4단계 증설사업 위·수탁 협약체결(전주시↔한국환경공단)  : ’19. 12.

○ 기본 및 실시설계용역 착수(한국환경공단)                 : ’20. 6.

□ 금후계획

○ 기본 및 실시설계 용역 추진(한국환경공단)    : ’20. 6. ∼ ’22. 7.

○ 공사 계약 및 착공(한국환경공단)                 : ’23. 1.

○ 공사 추진(한국환경공단)                        : ’23. ∼ ’24. 12.

하수정비팀

농촌마을 환경개선 하수도 정비사업

○ 농촌마을에 오수관을 설치하여 생활오수를 깨끗이 처리함으로써

주민들의 삶의 질 향상 및 새만금 상류지역 수질개선 기여

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2005년 ∼ 2023년(17년간)

○ 위    치 : 관내 농촌마을 일원(21개 지구, 41개 마을)

○ 사 업 비 : 52,720백만원(국비 70%, 시비 25%, 기금 5%)

○ 사업규모 : 21개 지구(처리시설 700㎥/일, 관로 85.4km)

□ 추진상황

○ 2020년까지 완료(88%, 46,563백만원) : 16개지구

- 10개 지구(처리시설 540㎥/일 관로 85.4km), 6개 지구 연계처리

○ 2021년 사업시행(12%, 6,157백만원) : 5개지구

- 처리시설 160㎥/일, 관로 26.6km

※ 현재 추진중인 사업내역                                     (단위 : km, 백만원)

사 업 명		사업규모	총투자 규모	기투자액	2021년	2022년 이후	비 고 (추진실적/계획)
총 계		34.8km Q=160㎥/일	21,754	16,257	2,195	3,302
계속 사업 (2015. ~ 2021.)	화신지구 (조촌동)	9.6 (Q=95㎥/일)	6,563	5,635	928	0	- 공사중(’18. 5. ~ ’21. 12월) - 공 정 : 81%
	원동지구 (조촌동)	3.2	2,244	2,236	8	0	- 공사중(’18. 5. ~ ’21. 7월) - 공 정 : 99%
	구원지구 (조촌동)	2.8	3,637	3,277	360	0	- 공사중(’18. 5. ~ ’21. 8월) - 공 정 : 90%
계속 사업 (2018. ~ 2023.)	신기지구 (조촌동)	3.8 (Q=65㎥/일)	3,616	1,871	540	1,205	- 공사중(’2 0. 12. ~ ’22. 12월) - 공사착수 : 2020. 12. - 공 정 : 12%
	전당, 아중·용계지구 (전미동 등)	7.2	5,694	3,238	359	2,097	- 공사중(’2 0. 7. ~ ’22. 12월) - 공사착수 : 2020. 7. - 공 정 : 20%

□ 금후계획

○ 사업추진(계속 5)                          : ’20. 6. ∼ ’22. 12.

지하수관리팀

체계적인 지하수 관리로 하수도 자주재원 확충

○ 지하수시설에 대한 체계적인 관리 강화로 적정한 지하수 개발 ․

이용을 도모하고 수질오염 예방 및 물 부족 상황에 적극 대비

□ 주요현황

○ 지하수시설 등록현황 (2021. 6. 30일 기준)

(단위 : 개소)

구 분	총 계	생활용수			농업용	공업용
		소계	음용수	비음용수
계	6,136	3,379	233	3,146	2,702	55
신 고	5,914	3,278	218	3,060	2,609	27
허 가	222	101	15	86	93	28

○ 주요업무

- 하수도사용료 부과대상 조사 및 계량기 설치․고장 여부 조사

- 미신고․허가 지하수시설 발굴 및 시설물 실태 파악

- 지하수시설 불용공, 미사용, 행불, 고장, 방치 여부 조사 등

-『지하수통합 정보관리시스템』운영 활성화

□ 추진상황

○ 지하수 공인유량계 신설 및 교체 (’21. 65개소)

○ 검침곤란 시설 옥외검침시스템 유지보수 (674개소)

○ 지하수시설 이용실태 현장조사 (’21. 303개소)

- 계량기 미부착 가구 공인유량계 설치, 방치공 처리안내 등

○ 지하수 보조관측망 설치 및 운영 : 총 20개소 운영(’21. - 4개소 설치)

□ 금후계획

○ 지하수 의심사용가·다량사용가에 대한 지속적 점검 관리

○ 공인유량계 신설·교체 및 옥외검침시스템 사후 유지관리

○『지하수통합 정보관리시스템』마을하수관로 GIS공간 데이터 연계구축