제388회 전주시의회 임시회 도 시 건 설 위 원 회

2022년도

주요업무계획

도 시 공 간 혁 신 추 진 단

보  고  순  서

□	일 반 현 황		-------	1
□	부 서 별 주 요 기 능		-------	2
□	기 본 현 황		-------	3
□	주요업무 추진계획		-------	4
	○	도시공간혁신과	-------	4
	○	종합경기장재생과	-------	13
	○	뉴딜추진과	-------	18

일  반  현  황

□ 기   구 : 3과 1단 10팀

									도시공간혁신추진단
	도시공간혁신과 (1단 3팀)									종합경기장재생과 (4팀)								뉴딜추진과 (3팀)
	도시공간정책팀									1963기획팀								지역균형뉴딜팀
	도시공간사업팀									경기장이전팀								그린뉴딜팀
	도시공간활성화팀									컨벤션시설팀								디지털뉴딜팀
	경제기반형 뉴딜추진단									개발사업팀

□ 정‧현원

과 별		총 계	일 반 직						별정	기능
			4급	5급	6급	7급	8급	9급
계	정 원	39	1	3	10	19	5	1	-	-
	현 원	43	1	3	14	15	5	5	-	-
도시공간 혁 신 과	정 원	15	1	1	3	9	-	1	-	-
	현 원	20	1	1	6	7	3	2	-	-
종합경기장 재 생 과	정 원	12	-	1	4	5	2	-	-	-
	현 원	13	-	1	4	6	-	2	-	-
뉴딜 추진과	정 원	12	-	1	3	5	3	-	-	-
	현 원	10	-	1	4	2	2	1	-	-

부서별 주요기능

과 별	분 장 사 무
도시공간 혁신과	○ 도시재생 전략계획 및 활성화 계획 수립 관리 ○ 도시재생 주요 정책개발 및 중앙부처 도시재생사업 연계 대응 ○ 도시재생 시범사업 발굴 및 추진계획 수립 ○ 도시재생 뉴딜사업 및 도시재생 새뜰마을 사업 추진 ○ 도심 특화(특정)거리 조성 및 관리 ○ 도심 광장 운영 및 관리 ○ 덕진권역 경제기반형 도시재생 뉴딜사업 추진
종합경기장재생과	○ 전주 종합경기장 부지재생 ○ 전주 육상경기장 증축 및 야구장 건립 ○ 전시컨벤션·호텔 건립 ○ 옛 대한방직 부지 개발사업 추진
뉴딜 추진과	○ 전주형 뉴딜 계획 수립 및 추진 ○ 뉴딜사업 발굴 및 대응(국가예산 및 공모대응 등) ○ 뉴딜정책 동향 및 관련자료 수집분석 ○ 뉴딜사업 자문단 운영 ○ 뉴딜정책 홍보 ○ 스마트 그린도시 조성사업 추진 ○ 비대면 분야(메타버스 포함) 디지털뉴딜 사업 추진 ○ 디지털커머스 전문기관 구축 및 운영

기  본  현  황

□ 도시공간혁신추진단 관련 민간위탁 현황

센터명	전주시 도시재생지원센터
위탁기간	’22.01.24.~’23.12.31.
위탁법인	사이시옷
대 표	김 명 규
직 원	도시재생 6
장 소	전주 도시혁신센터(완산구 물왕멀3길 29)
주요기능	· 전주형 도시재생 활성화를 위한 민관 거버넌스 구축 · 사회통합적 도시재생 실현을 위한 공간 지원
위탁사업비	451백만원

□ 도시재생 사업 추진 조직체계 현황

					도시공간혁신과
												도시재생지원센터
서학동 예술마을 현장지원센터(5명) - 센터장 1, 코디(팀장․팀원) 4								첫마중길 현장지원센터(5명) - 센터장 1, 코디(팀장․팀원) 4								여의주마을 현장지원센터(3명) - 센터장 1, 코디(팀장․팀원) 2
< 서학동예술마을 도시재생> ○ 위 치 : 서학동예술마을 일원 ○ 사업기간 : ’18~’22년(5개년) ○ 사 업 비 : 172억원								< 전주역세권 도시재생 > ○ 위 치 : 첫마중길 일원 ○ 사업기간 : ’19~’23년(5개년) ○ 사 업 비 : 300억원								< 용머리 여의주마을 도시재생> ○ 위 치 : 서완산동1가 일원 ○ 사업기간 : ’19~’22년(4개년) ○ 사 업 비 : 75억원
			도토리골 현장지원센터(5명) - 센터장 1, 코디(팀장․팀원) 4									남노송동 현장지원센터(4명) - 센터장 1, 코디(팀장․팀원) 3									동완산동 현장지원센터(2명) - 센터장 1, 코디(팀장․팀원) 1
			< 도토리골 새뜰마을> ○ 위 치 : 도토리골1길 일원 ○ 사업기간 : ’19~’22년(4개년) ○ 사 업 비 : 43억원									< 남노송동 새뜰마을> ○ 위 치 : 마당재2길 일원 ○ 사업기간 : ’20~’23년(4개년) ○ 사 업 비 : 42억원									< 동완산동 새뜰마을> ○ 위 치 : 곤지산3길 일원 ○ 사업기간 : ’21~’24년(4개년) ○ 사 업 비 : 42억원

도시공간혁신과  소 관

□	태평·다가지역 도시재생 공모사업 대응	----	5
□	서학동 예술마을 도시재생 뉴딜사업	----	6
□	전주 역세권 도시재생 뉴딜사업	----	7
□	용머리 여의주마을 도시재생 뉴딜사업	----	8
□	도토리골 새뜰마을 조성사업	----	9
□	남노송동 새뜰마을 조성사업	----	10
□	동완산동 새뜰마을 조성사업	----	11
□	덕진권역 경제기반형 도시재생 뉴딜사업	----	12

도시공간정책팀

태평⸱다가지역 도시재생 공모사업 대응

○ 원도심 내 재개발예정지역 해제 등으로 노후 건축물 방치 및 생활인프라 등이 열악한 지역에 대하여 공모사업을 통해 생활기반 구축 및 주민의 삶의 질 개선 도모

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023년∼2027년(5개년)

○ 위    치 : 완산구 태진로 15-14 일원(독립영화관 신축부지 인근)

○ 면    적 : 175,252㎡

○ 사 업 비 : 273억원정도(국비 164, 지방비 109)

○ 사업내용

- 골목상권과 특화거리를 활용한 지속가능한 상권 재생

- 영화 콘텐츠를 활용한 거점기능의 회복 및 유동인구 유입

□ 추진상황

○ 태평·다가지역 공모 대응을 위한 지역 현황 조사	: '21. 10.~

□ 금후계획

○ 태평·다가지역 활성화계획 수립 용역 추진	: '22. 2.~7.

○ 공모사업 1차 사전컨설팅(LH 사전기구)	: '22. 4.

○ 공모사업 2차 사전컨설팅(LH 사전기구)	: '22. 5.

○ 활성화계획 수정 및 보완	: '22. 6.

○ 태평·다가 도시재생 뉴딜사업 공모 신청	: '22. 7.

도시공간사업팀

서학동 예술마을 도시재생 뉴딜사업

○ 생활 기반시설 확충, 골목상권 살리기, 지역공동체 활성화 등을 통해 쇠퇴한 근린지역을 활성화시키고 지역 주민 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018년∼2022년(5개년)

○ 위    치 : 완산구 서학동 예술마을 일원(156,846㎡)

○ 사 업 비 : 17,197백만원(국 10,000 도 1,720 시 5,477)

- '22년 예산 : 4,820백만원(국 1,105 도 418 시 3,297)

○ 사업내용

- 거점시설 조성(창작레지던시플라자, 행복플러스센터, 복합문화시설 조성)

- 가로정비 사업(예술테마거리, 근린생활가로, 골목길 조성)

- 마을 조성(노후 주거지 정비(집수리), 마을정원화, 첨단안전마을, 주차장 조성)

- 주민역량 강화 사업 및 거버넌스(주민협의체 운영)

□ 추진상황

○ '17년 도시재생 뉴딜사업 공모 선정(국토교통부)	: '17. 12.

○ '18년 도시재생활성화계획 승인 및 고시	: '18. 11.

○ 마중물사업(거점시설 조성, 가로정비 사업, 노후 주거지 정비) 착수	: '21. 3.~

- 거점시설(창작레지던시플라자, 행복플러스센터) 리모델링공사 완료	: '21. 9.

- 근린생활가로조성(천경로) 정비공사 완료	: '21. 10.

- 노후 주거지 정비 1차 사업 완료(153가구 중 76가구)	: '21. 12.

□ 금후계획

○ 주민 친화적 마을 조성 완료	: '22. 4.

- 마을정원화사업, 첨단안전마을조성, 주차장(2개소) 조성

○ 가로정비 사업(3개소) 완료	: '22. 6.

- 예술테마거리, 근린생활가로, 골목길 조성 사업

○ 거점시설조성(복합문화시설) 완료	: '22. 6.

○ 노후 집수리 정비 2차(45가구), 3차(32가구)사업 완료	: '22. 8.

○ 서학동 예술마을 도시재생 뉴딜사업 완료	: '22. 12.

도시공간사업팀

전주 역세권 도시재생 뉴딜사업

○ 전주역 환승거점 및 복합시설 조성과 역세권 혁신 거점시설 조성을 통한 부도심 기능 회복

○ 주민역량강화 및 주민 공동체 기반 강화로 주민의 삶의 질 개선

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019년∼2023년(5개년)

○ 위    치 : 덕진구 우아동3가 첫마중길 일원(201,300㎡)

○ 사 업 비 : 30,000백만원(국 15,000 도 2,500 시 12,500)

- '22년 예산 : 4,922백만원(본예산 3,389 이월 1,533)

○ 사업내용 : 전주역 주변 부도심 기능 회복

- 역세권 혁신관광소셜플랫폼(복합환승장) 조성

- 청년기반 거점 조성(청년창업이음센터, 청년주택, 청년문화놀이터 등)

- 도심공간의 질 향상(보행친화도로 정비, 생활SOC 복합시설 조성 등)

- 주민역량 강화(주민조직 활성화 등)

□ 추진상황

○ '18년 도시재생 뉴딜사업 공모 선정(국토교통부)	: '18. 8.

○ 도시재생 활성화계획 승인(국토교통부)	: '19. 12.

○ 마중물 사업 착수	: '20. 1.~

- 청년창업이음센터 개소(VR․AR제작지원센터)	: '20. 1.

- 다목적주차장 조성 완료	: '21. 4.

- 첫마중길 생활 SOC 복합시설 리모델링공사 완료	: '21. 9.

- 보행친화도로 조성공사 착공	: '21. 9.

- 청년문화놀이터 부지 매입	: '21. 12.

□ 금후계획

○ 주민역량강화 사업 및 공동체 활성화 추진	: 연중

○ 단위사업별 마중물 사업 추진	: '22. 2.~

- 혁신관광소셜플랫폼, 전주맛집창업교육관, 청년문화놀이터 등 기본 및 실시설계 추진, 보행친화도로 조성 등

도시공간사업팀

용머리 여의주마을 도시재생 뉴딜사업

○ 폐·공가 등 노후주택이 밀집되어 정주 여건이 좋지 않은 지역에  노후주택 정비 및 기반시설 구축으로 지속 가능한 삶의 터전 마련

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019년∼2022년(4개년)

○ 위    치 : 완산구 유기전1길 5-74 일원(49,163㎡)

○ 사 업 비 : 7,626백만원(국 4,500 도 747 시 2,379)

- '22년 예산 : 2,629백만원(본예산 159 이월 2,470)

○ 사업내용

- 살기 좋은 마을만들기(노후주택정비, 생태숲공원조성, 주민공동이용시설조성)

- 안전한 마을만들기(방범용CCTV설치, 가로등설치, 골목길정비, 공동텃밭조성)

- 함께하는 마을만들기(역량강화교육, 마을관리협동조합 운영)

□ 추진상황

○ '18년 도시재생 뉴딜사업 공모 선정(국토교통부)	: '18. 8.

○ 도시재생 활성화 계획 계획 승인(국토교통부)	: '19. 9.

○ 마중물 사업(마을만들기사업) 착수	: '20. 1.~

- 마을진입쉼터조성 및 가로환경개선(CCTV, 보안등 설치)	: '20. 11.

- 노후주택정비 지붕개량공사(5개소) 완료	: '20. 12.

- 옛이야기 도서관 조성공사 착공	: '21. 9.

- 주민공동이용시설 조성사업 착공	: '21. 10.

- 노후주택정비 외부집수리공사(25개소) 완료	: '21. 12.

□ 금후계획

○ 단위사업별 마중물 사업 추진	: '22. 2.~

- 옛이야기 도서관 조성공사 완료	: '22. 4.

- 생태숲(소공원) 조성공사 완료	: '22. 4.

- 주민공동이용시설 조성사업 완료	: '22. 6.

- 용머리여의주마을 도시재생 뉴딜사업 완료	: '22. 12.

도 시 공 간 활 성 화 팀

도토리골 새뜰마을 조성사업

○ 재해 위험 예방 등 취약한 마을 주거환경을 개선하여 기초생활 인프라 확충 및 지속가능한 생활여건 조성으로 주민 만족도 제고

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019년∼2022년(4개년)

○ 위    치 : 덕진구 도토리골1길 10 일원(34,000㎡)

○ 사 업 비 : 4,286백만원(국 3,000 도 386 시 900)

- '22년 예산 : 998백만원(국 549 도 70 시 379)

○ 사업내용 : 공동이용시설 조성, 노후주택 정비, 생활방범시설 설치, 주민역량강화 및 마을공동체 육성, 휴먼케어 등

□ 추진상황

○ 새뜰마을사업 공모 선정(국토교통부)	: '19. 4.

○ 현장지원센터 개소 및 운영	: '19. 12.

○ 주민돌봄센터 개소 및 운영(복지 프로그램)	: '20. 3.

○ 생활방범시설(보안·가로등 50개, CCTV 5개 설치)시행	:  '20. 6.~12.

○ 우선사업(재해예방공사) 시행	: '21. 5.~11.

○ 집수리 선정위원회 개최 및 집수리 완료	: '21. 6.

- 20년 9가구 완료, 21년 30가구 완료

○ 슬레이트철거 및 지붕개량(5가구) 완료	: '21. 7.

○ 거점공간 증축 실시설계 추진	: '21. 7.~

○ 주민공동이용시설(주차장, 쉼터 등)조성공사 시행	: '21. 9.~

□ 금후계획

○ 주민역량강화 및 공동체 활성화 추진	: 연중

○ 주민공동이용시설(주차장 쉼터 등) 완료	: '22. 3.

○ 거점공간 증축공사 완료	: '22. 7.

○ 사업완료	: '22. 12.

도 시 공 간 활 성 화 팀

남노송동 새뜰마을 조성사업

○ 낙후된 남노송동 일원에 안전 및 생활 인프라를 확충하여 쾌적하고 살기좋은 마을 조성으로 주민의 삶의 질 개선

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020년∼2023년(4개년)

○ 위    치 : 완산구 마당재2길 53 일원(46,205㎡)

○ 사 업 비 : 4,157백만원(국 2,910 도 374 시 873)

- '22년 예산 : 1,327백만원(국 929 도 119 시 279)

○ 사업내용 : 노후주택 정비, 거점공간 조성, 기반시설정비 및 확충, 주민역량강화 및 공동체 활성화 지원, 휴먼케어 등

□ 추진상황

○ 새뜰마을사업 공모 선정(국토교통부)	: '20. 3.

○ 현장지원센터 부지 매입 및 리모델링	: '20. 7.~12.

○ 우선사업 승인(집수리, 공‧폐가, 토지매입)	: '20. 12.

○ 현장지원센터 개소 및 운영	: '21. 1.

○ 마을방범 CCTV 설치(6개소)완료	: '21. 8.

○ 보안등 교체(80개) 및 설치(4개) 완료	: '21. 8.

○ 슬레이트철거 및 지붕개량(4가구) 완료	: '21. 11.

○ 거점공간 부지 매입(2필지, 408㎡)	: '21. 12.

○ 공·폐가 철거(3가구) 완료	: '21. 12.

□ 금후계획

○ 집수리 지원사업(8가구) 완료	: '22. 2.

○ 골목길 및 위험담장 정비 추진	: '22. 3.~

○ 생활인프라(지붕개량, 집수리 등) 구축사업 추진	: '22. 6.

도 시 공 간 활 성 화 팀

동완산동 새뜰마을 조성사업

○ 재해 위험 예방 등 취약한 마을 주거환경을 개선하여 기초생활 인프라 확충 및 지속가능한 생활여건 조성으로 주민 만족도 제고

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2021년∼2024년(4개년)

○ 위    치 : 완산구 곤지산3길 일원(30,643㎡)

○ 사 업 비 : 4,187백만원(국 2,900 도 386 시 901)

- '22년 예산 : 1,091백만원(국 755 도 101 시 235)

○ 사업내용 : 노후주택 정비, 거점공간 조성, 기반시설정비 및 확충, 주민역량강화 및 공동체 활성화 지원, 휴먼케어 등

□ 추진상황

○ 새뜰마을사업 공모 선정(국토교통부)	: '21. 3.

○ 우선사업 승인 (국토교통부)	: '21. 3.

- 주택정비, 안전확보, 주민공동이용시설 조성 등

○ 마스터플랜 수립 및 실시설계 용역 추진	: '21. 10.

□ 금후계획

○ 현장지원센터 리모델링 및 개소	: '22. 2.

○ 주민설명회 개최	: '22. 2.

○ 우선사업(안전확보) 실시설계 완료	: '22. 3.

○ 우선사업 공사 추진	: '22. 3.~

경제기반형뉴딜추진단

덕진권역 경제기반형 도시재생 뉴딜사업

○ 전주시 종합경기장 부지를 포함한 덕진권역 일대를 메타버스 중심 첨단 디지털 문화콘텐츠 산업 거점으로 조성하여 새로운 일자리 창출 및 지역 경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022년∼2027년(6개년)

○ 위    치 : 덕진구 기린대로 451 일원(498,000㎡)

○ 사 업 비 : 55,570백만원(국 25,000 도 4,200 시 26,370)

○ 사업내용 : 종합경기장 등 기존 건축물 재생 및 기반시설 정비

- 거버넌스 기반 아이디어 플랫폼 구축, 메타버스 사업화 실증단지 조성, 저탄소 친환경 특화거리 및 창업지원주택 조성

□ 추진상황

○ 도시재생 뉴딜사업 공모 신청(국토부)	: '21. 9.

○ 도시재생특별위원회 심사위원 현장실사(국토부)	: '21. 10.

○ 도시재생특별위원회 심사위원 종합평가(국토부)	: '21. 11.

○ 도시재생특별위원회 심의 및 선정	: '21. 12.

□ 금후계획

○ 경제기반형 도시재생 뉴딜사업 전문가자문단 구성	: '22. 2.

○ 도시재생활성화계획 승인(전북도) 및 고시	: '22. 3.

○ 현장지원센터 개소 및 주민협의체 구성	: '22. 5.~6.

○ 거점공간 기본 및 실시설계용역 추진	: '22. 7.~

종합경기장재생과  소 관

□	전주 종합경기장 부지재생	----	14
□	전주 육상경기장 증축 및 야구장 건립	----	15
□	전시컨벤션·호텔 건립	----	16
□	옛 대한방직 부지 개발사업 추진	----	17

1963기획팀

전주 종합경기장 부지재생

○ 전주시민의 추억이 깃들어 있는 종합경기장의 정체성을 지켜내고시민들의 다양한 욕구를 충족할 수 있는 재생사업 추진

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2021. ∼ 2027. (7개년)

○ 위    치 : 전주시 덕진구 기린대로 451 일원

○ 사업규모 : 종합경기장 부지재생 120,715㎡

○ 사업내용

- (재정사업) 도시숲 조성(경기장재생, 문화시설 포함) 67,715㎡

- (민자사업) 전시컨벤션센터 25,000㎡ / 호텔 5,000㎡ / 백화점 23,000㎡

○ 총사업비 : 5,934억원(재정 1,859, 민자 4,075)

□ 추진상황

○ 종합경기장 부지재생 기본구상 용역 추진 완료	: ’19. 11.∼’21. 1.

- 전문가자문단 구성ㆍ운영	: ’20. 1.∼12.

- 시민 의견수렴(설문조사, 시민참여단, 시민아이디어공모)	: ’20. 3.∼12.

- 생태도시위원회 자문 / 의회 간담회	: ’20. 12. / ’21. 1.

○ 시민의숲1963 행정협의회 구성 및 운영	: ’21. 2.∼

○ 종합경기장 부지재생 세부사업(관계부서) 추진	: ’21. 9.∼

- 덕진권역 도시재생 뉴딜사업(경제기반형) 공모 선정	: ’21. 9.∼12.

- 저영향개발(LID) 타당성조사 및 기본계획 추진  : ’21. 9.∼’22. 3.

- 한국문화원형 콘텐츠 체험□전시관 타당성조사 추진 : ’21. 9.∼’22. 2.

- 정원의 숲(4,100㎡) 기본 및 실시설계용역 추진  : ’21. 11.∼’22. 2.

- 전주형 그린스타트업 타운조성 기본구상용역 추진 : ’21. 12.∼’22. 2.

□ 금후계획

○ 전문가자문단 및 행정협의회 지속 운영	: ’22. 1.∼

○ 도시관리계획 결정(변경) 및 기본설계 추진	: ’22. 2.∼’23. 10.

○ 종합경기장 부지재생 세부사업(관계부서) 추진	: ’22. 2.∼’27. 12.

경기장이전팀

전주 육상경기장 증축 및 야구장 건립

○ 노후된 현 종합경기장 및 야구장 기능을 대체하고 쾌적한 체육시설을 조성하여 시민의 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019. ∼ 2024. (6개년)

○ 위    치 : 전주시 덕진구 온고을로 644 일원

○ 사 업 비 : 900억원(국비 90, 시비 540, 지방채 270)

○ 사업내용 : 부지면적 122,645㎡

- 1종 육상경기장 1식(10,000석, 연면적 8,530㎡ 지하1/지상3층)

- 야구장 1식(8,000석, 연면적 7,620㎡, 지하1/지상2층)

□ 추진상황

○ 2019년 지방재정 투자심사 완료	: ’19. 7.

○ 편입토지(14필지) 매입 및 국유지(3필지) 무상귀속 완료	: ’19. 8.∼’21. 5.

○ 건축 설계공모 등 각종 용역 추진	: ’19. 11.∼

○ 전문가 자문단 운영(자문위원 7명)	: ’20. 7.∼

○ 의회 간담회	: ’21. 1. 15.

○ 실시설계용역 착수	: ’21. 6.∼

○ 건축 인허가 협의 추진	: ’21. 7.∼

○ 설계용역 중간보고회	: ’21. 10. 13.

□ 금후계획

○ 실시설계용역 완료	: ∼’22. 5.

○ 행정절차 이행	: ∼’22. 7.

○ 공사 발주 및 사업완료	: ’22. 8.~ ’24. 12.

컨벤션시설팀

전시컨벤션·호텔 건립

○ 전시컨벤션 인프라 구축으로 한옥마을 등 관광자원과 시너지 효과를 창출하여 지역경제 활성화를 이끌 마이스(MICE)산업의 핵심기지 조성

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019. ∼ 2025. (7개년)

○ 위    치 : 전주시 덕진구 기린대로 451 일원

○ 사업면적 : 30,000㎡(전시컨벤션센터 25,000㎡, 호텔 5,000㎡)

○ 사업내용

- 전시컨벤션 : 전시장 5,000㎡, 국제회의장 1실(2천명 수용), 중소회의실 10실

- 호       텔 : 200실 이상

○ 사 업 비 : 1,705억원 정도(시비 미포함)

- 시비 3억원 별도 기투입(타당성조사용역2, 감정평가1)

○ 사업방식 : 민간자본유치(전주시↔롯데쇼핑 장기임대)

□ 추진상황

○ 민간사업자(롯데쇼핑) 협약체결(기부대양여 방식)	: ’12. 12.

○ 사업계획변경 협의(기부대양여→장기임대)	: ’19. 4.

○ 타당성분석 및 기본구상 용역 완료	: ’20. 12.

○ 지방재정 투자사업 타당성조사 용역 완료(지방행정연구원)	: ’21. 12.

○ 지방재정 중앙투자심사 의뢰(시→도→행안부)	: ’21. 12.

□ 금후계획

○ 지방재정 중앙투자심사 추진(행안부)	: ’22. 1.~3.

○ 시의회 사업계획(변경) 및 공유재산관리계획(안) 승인	: ’22. 4.~6.

○ 민자사업 시행 협약(변경) 체결(전주시↔롯데쇼핑)	: ’22. 7.

○ 행정절차이행(기본 및 실시설계, 인허가 등) 및 사업추진	: ’22. 8〜’25. 12.

개발사업팀

옛 대한방직 부지 개발사업 추진

○ 옛 대한방직 부지관련 시민공론화위원회 권고에 따라 도시계획변경에 대하여

토지소유자와 협의하여 합리적인 개발계획을 수립하고자 함

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 완산구 유연로 220 일원 (전북도청 뒷편)

○ 면    적 : 14필지 / 230,565㎡

○ 용도지역 : 주거용지(도시기본계획), 공업지역(도시관리계획)

○ 소 유 자 : ㈜자광 216,464㎡(93.9%), 도 6,228㎡(2.7%), 시 7,873㎡(3.4%)

□ 추진상황

○ 대한방직 전주공장 건설(공업지역)	: ’72 ∼ ’74

○ 주민제안(지구단위계획) 신청서 제출 및 수용불가 회신	: ’18. 11.

- 도시기본계획 불부합, 재산관리청(전북도)의 의견 불명확

○ 정책제안서 제출 (민간제안자→시)	: ’19. 3.∼5.

- (당초) 전주‘타워복합개발’정책제안서 제출

- (변경) 컨벤션센터 ⇒ 복합문화센터 혹은 문화예술의 전당 제안

○ 2019년 예산결산위원회 권고	: ’19. 7.

○ 사전준비위원회 구성 및 운영(회의 5회 개최)	: ’20. 2.∼ 4.

○ 시민공론화위원회 구성 및 운영(회의 20회 개최)	: ’20. 5. ∼  ’21. 5.

○ 시민공론화위원회 권고문 제출 (위원회→시)	: ’21. 2.

○ 권고사항 통보 (시→민간제안자)	: ’21. 3.

○ 권고문 통보에 관한 회신(민간제안자→시)	: ’21. 4.

- 권고사항 반영하여 개발계획 수립

○ 전주시 도시계획조례 개정	: ’21. 11.

□ 금후계획

○ 전주시 도시계획 변경 사전협상 운영지침 수립	: ’22. 1. ~

- 공공기여 관련 전문가자문단 구성(법률자문, 타지역 사례검토 등) 추진

○ 옛 대한방직 부지 개발계획 협의(시↔민간제안자)	: ’22. 4. ~

- 용도지역변경, 건축・교통계획, 기반시설설치 등

뉴딜추진과  소 관

□	미래성장동력 「전주형 뉴딜」 추진	----	19
□	스마트 그린도시 조성사업	----	20
□	소상공인 실시간 소통공간(디지털커머스 전문기관) 구축·운영	----	21

지역균형뉴딜팀

미래성장동력「전주형 뉴딜」추진

○ 한국판 뉴딜정책을 지역기반으로 확장하고, 지역의 여건과 특성을 반영하여 미래 발전을 견인할 전주형 뉴딜 추진

□ 추진방향

○ 한국판 뉴딜 2.0 등 정부정책에 맞추어 디지털, 그린, 휴먼 뉴딜을 중심으로 시정 핵심과제 연계 추진

○ 한국판 뉴딜을 지역기반으로 확장하여 우리 시 여건과 특성에 맞는 지역균형 뉴딜 사업 중점 발굴 및 추진

* 「국가균형발전 특별법」 개정(’21.12.21.)으로 지역균형 뉴딜 지원절차 등에 대한 법적근거가 마련되어, 지역균형 뉴딜 사업에 대한 행정적·재정적 지원 강화

□ 추진상황

○ 뉴딜정책에 대한 추진력 확보를 위해 전담조직 구성

- (’21) 뉴딜팀(뉴딜추진단, 디지털(스마트시티과), 그린(맑은공기에너지과)) → (’22) 뉴딜추진과

○ ’21년 전주형 뉴딜 종합계획 수립	: ’21. 2.

○ 분야별 뉴딜사업 발굴 및 관리	: ’21. 2. ∼ 12.

- (사업관리) 162개 사업(디지털 68, 그린 67, 상생연대 27)

- (공모대응)  64개 대응, 44개 선정[국비 총 1,948억원(’21년 176억원)]

○ 분야별 정책자문단 운영	: 수시

- 디지털뉴딜 정책자문단(’20.11.), 메타버스 총괄자문관(’21.9.), 그린뉴딜 정책자문단(’21.3.)

□ 추진계획

○ (계획수립) ’22년 전주형 뉴딜 실행계획 수립 및 추진	: ’22. 2월중

○ (사업발굴) 정부정책에 부합하는 신규사업 발굴 및 공모사업 대응, 사업 당위성, 필요성 논리보완 지원 등	: 연중

○ (사업관리) 분기별 추진상황 점검, 사업추진에 따른 문제점 보완, 제도개선사항 수렴 및 건의 등	: 연중

그린뉴딜팀

스마트 그린도시 조성사업

○ 산단 배후지역 기후변화 대응력을 높이고, 지속가능한 삶터로서의 원동력 마련을 위해 주민이 체감할 수 있는 스마트 녹색 도시로 전환

□ 사업개요

○ 사업기간 : ’21. 3. ∼ ’22. 12.

○ 사 업 비 : 15,472	백만원(국 9,272 도 1,412 시 4,788)

○ 대 상 지 : 전주시 덕진구 팔복동 1가 일원(255,228㎡)

○ 사업내용

- (녹색 탄소중립 ICT 마을숲 조성)

·쿨링 앤 클린로드 조성 : 빗물활용 자동살수시스템, 식생수로(빗물정원) 조성 등

·물순환 청정길 : 녹색쉼터, 가로등·보안등 개선, 쓰레기 배출시설 교체 등

- (스마트 그린 에너지 마을 조성) 스마트 쉘터, 공공건물 그린 리모델링 등

□ 추진상황

○ 사전행정절차 이행(지방재정투자심사, 일상감사 및 계약심사 등)	: ’21. 3. ∼ 6.

○ 쿨링 앤 클린로드 조성사업 기본 및 실시설계 용역 시행	: ’21. 7. ∼ ’22. 2.

○ 물순환 청정길 사업 기본 및 실시설계 용역 시행	: ’21. 9. ∼ ’22. 5.

○ 스마트 쉘터(스마트 버스승강장) 조성 추진	: ’21. 10. ∼

- 5개 관련기관·부서 현장점검 및 업무 협의(’22.1.14.)

○ 공공건물(팔복동 주민센터) 그린 리모델링 추진	: ’21. 11. ∼ ’22. 4.

- 기획설계 및 구조안전진단 용역(’21.11.∼12.), 기본 실시설계 용역(’22.1.∼4.)

□ 추진계획

○ 스마트 쉘터(스마트 버스승강장) 조성(4개소)	: ’22. 1. ∼ 6.

○ 쿨링 앤 클린로드 조성사업 공사 추진	: ’22. 5. ∼ 12.

○ 물순환 청정길 조성사업 공사 추진	: ’22. 5. ∼ 12.

○ 스마트 가로등 교체	: ’22. 5. ∼ 12.

○ 쓰레기 배출시설 개선사업	: ’22. 5. ∼ 12.

○ 공공건물(팔복동 주민센터) 그린 리모델링 공사 추진	: ’22. 6. ∼ 12.

디지털뉴딜팀

소상공인 실시간 소통공간(디지털커머스 전문기관) 구축·운영

○ 소상공인의 온라인 디지털 대전환 지원을 위한 전문기관 구축 및 비대면 판매지원 산업 경쟁력 강화

□ 사업개요

○ 사업기간 : ’21. 5. ∼ ’25. 12.(5개년)

○ 사 업 비 : 4,720백만원(국 3,400 시 1,320)

○ 사업위치 : 전주시 덕진구 서귀로 107(팔복공원 내)

○ 시설규모 : 1,165.63㎡(약 353평) / 지상1층 ∼ 2층

○ 사업대상 : 지역 소상공인(남부시장 청년몰, 한옥마을, 서학예술마을, 예술창작가 등 집중)

○ 사업내용 : 디지털커머스 인프라구축 및 소상공인 디지털전환 지원

□ 추진상황

○ 중소벤처기업부 공모사업 선정, 실시설계 용역 등	: ’21. 5. ∼ 10.

○ 전주MBC 방송 및 NAVER 마케팅지원 협약	: ’21. 7. / 9.

○ 소상공인 디지털전환 지원	: ’21. 8. ∼ 12.

- 교육 프로그램 운영 : 51명 수료

- 디지털전환 콘텐츠 제작 지원 992건(라이브방송 425, 상품소개페이지 567)

○ 리모델링 공사 착공	: ’21. 10. ∼

□ 추진계획

○ 리모델링 공사 준공	: ’22. 2월중

○ 디지털커머스 전문기관 선진지 벤치마킹	: ’22. 2월중

○ 디지털커머스 전문기관 ’22년 활성화 계획수립	: ’22. 2월중

○ 디지털커머스 전문기관 개소식	: ’22. 3월중

○ ’22년 사업대상자 모집 및 프로그램 제작 지원	: ’22. 4. ∼ 12.

○ 민간 라이브방송 채널 연계 송출 및 쇼핑몰 입점 등	: ’22. 4. ∼ 12.