제394회 전주시의회 임시회 도 시 건 설 위 원 회

2022년도

주요업무추진상황

도 시 공 간 혁 신 추 진 단

보  고  순  서

□	일 반 현 황		-------	1
□	부 서 별 주 요 기 능		-------	2
□	기 본 현 황		-------	3
□	주요업무 추진상황		-------	4
	○	도시공간혁신과	-------	4
	○	종합경기장재생과	-------	12
	○	뉴딜추진과	-------	16

일  반  현  황

□ 기   구 : 3과 1단 10팀

									도시공간혁신추진단
	도시공간혁신과 (1단 3팀)									종합경기장재생과 (4팀)								뉴딜추진과 (3팀)
	도시공간정책팀									1963기획팀								지역균형뉴딜팀
	도시공간사업팀									경기장이전팀								그린뉴딜팀
	도시공간활성화팀									컨벤션시설팀								디지털뉴딜팀
	경제기반형 뉴딜추진단									개발사업팀

□ 정‧현원

과 별		총 계	일 반 직						별정	기능
			4급	5급	6급	7급	8급	9급
계	정 원	39	1	3	10	19	5	1	-	-
	현 원	44	1	4	13	16	5	5	-	-
도시공간 혁 신 과	정 원	15	1	1	3	9	-	1	-	-
	현 원	20	1	2	5	7	3	2	-	-
종합경기장 재 생 과	정 원	12	-	1	4	5	2	-	-	-
	현 원	14	-	1	4	7	-	2	-	-
뉴딜 추진과	정 원	12	-	1	3	5	3	-	-	-
	현 원	10	-	1	4	2	2	1	-	-

부서별 주요기능

과 별	분 장 사 무
도시공간 혁신과	○ 도시재생 전략계획 및 활성화 계획 수립 관리 ○ 도시재생 주요 정책개발 및 중앙부처 도시재생사업 연계 대응 ○ 도시재생 시범사업 발굴 및 추진계획 수립 ○ 도시재생 뉴딜사업 및 새뜰마을 사업 추진 ○ 도심 특화(특정)거리 조성 및 관리 ○ 도심 광장 운영 및 관리 ○ 덕진권역 경제기반형 도시재생 뉴딜사업 추진
종합경기장재생과	○ 전주 종합경기장 부지개발 - 전시컨벤션․호텔 건립(MICE 인프라 구축) ○ 전주 육상경기장 증축 및 야구장 건립 ○ 옛 대한방직 부지 개발사업 추진
뉴딜 추진과	○ 전주형 뉴딜 계획 수립 및 추진 ○ 뉴딜사업 발굴 및 대응(국가예산 및 공모대응 등) ○ 뉴딜정책 동향 및 관련자료 수집분석 ○ 뉴딜사업 자문단 운영 ○ 뉴딜정책 홍보 ○ 스마트 그린도시 조성사업 추진 ○ 비대면 분야(메타버스 포함) 디지털뉴딜 사업 추진 ○ 디지털커머스 전문기관 구축 및 운영

기  본  현  황

□ 도시공간혁신추진단 관련 민간위탁 현황

센터명	전주시 도시재생지원센터
위탁기간	’22.01.24.~’23.12.31.
위탁법인	사이시옷
대 표	김 명 규
직 원	도시재생 6
장 소	전주 도시혁신센터(완산구 물왕멀3길 29)
주요기능	· 전주형 도시재생 활성화를 위한 민관 거버넌스 구축 · 사회통합적 도시재생 실현을 위한 공간 지원
위탁사업비	451백만원

□ 도시재생사업 추진 조직체계 현황

					도시공간혁신과
												도시재생지원센터
서학동 예술마을 현장지원센터(4명) - 센터장 1, 코디(팀장․팀원) 3								전주역세권 현장지원센터(5명) - 센터장 1, 코디(팀장․팀원) 4								용머리 여의주마을 현장지원센터(5명) - 센터장 1, 코디(팀장․팀원) 4
< 서학동 예술마을 도시재생> ○ 위 치 : 서학동예술마을 일원 ○ 사업기간 : ’18~’22년(5개년) ○ 사 업 비 : 172억원								< 전주역세권 도시재생 > ○ 위 치 : 첫마중길 일원 ○ 사업기간 : ’19~’23년(5개년) ○ 사 업 비 : 300억원								< 용머리 여의주마을 도시재생> ○ 위 치 : 서완산동1가 일원 ○ 사업기간 : ’19~’22년(4개년) ○ 사 업 비 : 76억원
			도토리골 현장지원센터(3명) - 센터장 1, 코디(팀장․팀원) 2									남노송동 현장지원센터(4명) - 센터장 1, 코디(팀장․팀원) 3									동완산동 현장지원센터(3명) - 센터장 1, 코디(팀장․팀원) 2
			< 도토리골 새뜰마을> ○ 위 치 : 도토리골1길 일원 ○ 사업기간 : ’19~’22년(4개년) ○ 사 업 비 : 43억원									< 남노송동 새뜰마을> ○ 위 치 : 마당재2길 일원 ○ 사업기간 : ’20~’23년(4개년) ○ 사 업 비 : 42억원									< 동완산동 새뜰마을> ○ 위 치 : 곤지산3길 일원 ○ 사업기간 : ’21~’24년(4개년) ○ 사 업 비 : 42억원

도시공간혁신과  소 관

□	서학동 예술마을 도시재생 뉴딜사업	----	5
□	용머리 여의주마을 도시재생 뉴딜사업	----	6
□	전주역세권 도시재생 뉴딜사업	----	7
□	도토리골 새뜰마을 조성사업	----	8
□	남노송동 새뜰마을 조성사업	----	9
□	동완산동 새뜰마을 조성사업	----	10
□	덕진권역 경제기반형 도시재생 뉴딜사업	----	11

도시공간사업팀

서학동 예술마을 도시재생 뉴딜사업

○ 생활 기반시설 확충, 예술테마거리 조성, 지역공동체 활성화 등을 통해 쇠퇴한 서학동 근린지역을 활성화시키고 주민 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 위치/면적 : 완산구 서학동 예술마을 일원 / 156,846㎡

○ 사업기간 : 2018년 ∼ 2022년 (5개년)  ·국토부 공모선정 : '17. 12.

○ 총사업비 : 17,197백만원(국 10,000 도 1,720 시 5,477)

- '22년 예산 : 4,820백만원(국 1,105 도 418 시 3,297)

○ 사업내용

① 거점시설조성 : 창작레지던시 플라자, 행복플러스센터, 복합문화시설

② 가로정비사업 : 예술테마거리 조성, 근린생활가로 조성, 다양한 골목길 정비

③ 노후주거지 정비 및 마을조성 : 외부집수리, 마을정원화사업, 첨단안전마을 조성, 주차장 조성

④ 주민역량강화 및 거버넌스 구축 : 도시재생대학, 주민협의체 지원, 주민공모사업 지원 등

□ 추진상황

○ 거점시설 조성

- 복합문화시설 착공	: '21. 8.∼

- 창작레지던시플라자, 행복플러스센터 리모델링공사 완료	: '21. 9.

○ 가로정비 사업 추진

- 예술테마거리, 다양한 골목길 정비사업 착공	: '21. 9.∼

- 근린생활가로(천경로, 팔달로) 조성 완료	: '22. 5.

- 다양한 골목길 정비사업 완료	: '22. 6.

○ 노후주거지 정비 및 마을조성

- 마을정원화사업 착공	: '21. 9.∼

- 공영주차장(쌈지공원, 28면) 조성 완료	: '21. 9.

- 노후주거지 정비 1차(153가구 중 76가구) 완료	: '21. 12.

- 소규모주차장(23면) 2개소 조성 완료	: '22. 4.

- 첨단안전마을 조성사업 착공	: '22. 5.∼

□ 금후계획

○ 첨단안전마을조성 완료	: '22. 7.

○ 예술테마거리, 마을정원화사업 완료	: '22. 8.

○ 거점시설(복합문화시설), 노후주거지 정비 2,3차(77가구) 완료	: '22. 10.

○ 서학동 예술마을 도시재생 뉴딜사업 완료	: '22. 12.

도시공간사업팀

용머리 여의주마을 도시재생 뉴딜사업

○ 폐·공가 등 노후주택이 밀집되어 정주 여건이 좋지 않은 용머리 여의주마을 지역에 노후주택 정비 및 기반시설 구축으로 지속 가능한 삶의 터전 마련

□ 사업개요

○ 위치/면적 : 완산구 서완산동1가 용머리 여의주마을 일원 / 49,163㎡

○ 사업기간 : 2019년 ∼ 2022년 (4개년)  ·국토부 공모선정 : '18. 8.

○ 총사업비 : 7,626백만원(국 4,500 도 747 시 2,379)

- '22년 예산 : 2,629백만원(국 1,355 도 313 시 961)

○ 사업내용

① 살고싶은 마을만들기 : 노후주택·빈집정비, 생태숲공원, 공동텃밭 조성

② 편한 마을만들기 : 주민공동이용시설 조성, 소방도로 확장, 환경개선사업, 진입도로 조성

③ 함께하는 마을만들기 : 공동체역량강화교육, 주민공모사업, 이야기보따리단 마을 이야기꾼 양성, 마을관리협동조합 육성 및 지원

□ 추진상황

○ 살고싶은 마을 만들기

- 노후주택·빈집정비(30가구) 완료	: '21. 12.

- 생태숲 소공원 조성공사 완료	: '22. 6.

- 옛이야기도서관 조성공사 완료	: '22. 6.

○ 편한 마을 만들기

- 주민공동이용시설 실시설계용역 완료	: '21. 9.

- 주민공동이용시설 신축공사 착공	: '21. 12.∼

- 소방도로 확장, 환경개선사업, 진입도로 조성 완료	: '21. 12.

□ 금후계획

○ 주민공동이용시설 신축공사 준공	: '22. 8.

○ 용머리 여의주마을 도시재생 뉴딜사업 완료	: '22. 12.

도시공간사업팀

전주역세권 도시재생 뉴딜사업

○ 전주역 환승거점 및 복합시설 조성과 역세권 혁신 거점시설 조성을 통한 부도심 기능 회복

○ 주민역량강화 및 주민 공동체 기반 강화로 주민의 삶의 질 개선

□ 사업개요

○ 위치/면적 : 덕진구 우아동3가 첫마중길 일원 / 201,322㎡

○ 사업기간 : 2019년 ∼ 2023년 (5개년)  ·국토부 공모선정 : '18. 8.

○ 총사업비 : 30,000백만원(국 15,000 도 2,500 시 12,500)

- '22년 예산 : 4,922백만원(국 1,898 도 328 시 2,696)

○ 사업내용

① 역세권 혁신거점 조성 : 혁신관광소셜플랫폼

② 청년창업 허브 구축 : 청년창업이음센터, 전주맛집창업교육관, 청년창업주택, 청년문화놀이터

③ 도심 공간 질 향상 : 보행친화도로 정비, 첫마중길 공감치유센터 조성

④ 주민역량강화 및 상생기반 조성 : 도시재생대학, 주민공모사업, 주민·상인협의체 운영 지원, 빈공간 조사·활용 및 창업교육 등

□ 추진상황

○ 역세권 혁신거점 조성

- 혁신관광소셜플랫폼 기본 및 실시설계용역 추진	: '22. 3.∼

○ 청년창업 허브 구축

- 청년창업이음센터(VR·AR) 구축 완료	: '20. 1.

- 청년창업주택(LH) 착공	: '20. 12.∼

- 전주맛집창업교육관 기본 및 실시설계용역 추진	: '22. 3.∼

- 청년문화놀이터 기본 및 실시설계용역 추진	: '22. 3.∼

○ 도심공간의 질 향상

- 보행친화도로 조성공사 착공	: '21. 9.∼

- 첫마중길 공감치유센터 리모델링 공사 완료	: '22. 3.

□ 금후계획

○ 단위사업별 마중물사업 추진	: ∼'22. 12.

- 보행친화도로, 전주맛집창업교육관, 청년문화놀이터 조성 완료

○ 전주역세권 도시재생 뉴딜사업 완료(혁신관광소셜플랫폼)	: '23. 12.

도 시 공 간 활 성 화 팀

도토리골 새뜰마을 조성사업

○ 재해 위험 예방 등 취약한 마을 주거환경을 개선하여 기초생활 인프라 확충 및 지속가능한 생활여건 조성으로 주민 만족도 제고

□ 사업개요

○ 위치/면적 : 덕진구 진북동 923 일원 / 34,000㎡

○ 사업기간 : 2019년 ∼ 2022년 (4개년)  ·국토부 공모선정 : '19. 4.

○ 총사업비 : 4,286백만원(국 3,000 도 386 시 900)

- '22년 예산 : 998백만원(국 549 도 70 시 379)

○ 사업내용

① 안전확보 사업 : 생활방범시설, 재해예방공사

② 생활인프라 정비 : 거점공간 증축, 주민공동이용시설 조성

③ 노후주택 정비 : 집수리 지원사업

④ 주민역량강화 사업 : 주민돌봄프로그램 및 주민협의체 운영

□ 추진상황

○ 안전확보 사업

- 생활방범시설(보안·가로등 50개, CCTV 5개) 완료	: '20. 12.

- 재해예방공사(우수관로 및 노후 위험시설 정비) 완료	: '21. 11.

○ 생활 인프라 개선

- 거점공간 증축 추진	: '21. 7.∼

·실시설계용역 및 행정절차(건축허가, 원가심사) 완료(’22.5.), 공사착수(’22.6.)

○ 주민공동이용시설(주차장, 쉼터) 조성공사 완료	: '22. 5.

○ 노후주택정비(집수리 지원사업) 완료	: '22. 6.

- ’20년 9가구 완료, ’21년 30가구 완료, ’22년 10가구 완료

□ 금후계획

○ 거점이용시설 증축 공사 추진	: '22. 7.∼

○ 도토리골 새뜰마을사업 완료	: '22. 12.

도 시 공 간 활 성 화 팀

남노송동 새뜰마을 조성사업

○ 낙후된 남노송동 일원에 안전 및 생활 인프라를 확충하여 쾌적하고 살기좋은 마을 조성으로 주민의 삶의 질 개선

□ 사업개요

○ 위치/면적 : 완산구 마당재2길 53 일원 / 46,205㎡

○ 사업기간 : 2020년 ∼ 2023년 (4개년)  ·국토부 공모선정 : '20. 3.

○ 총사업비 : 4,157백만원(국 2,910 도 374 시 873)

- '22년 예산 : 1,327백만원(국 929 도 119 시 279)

○ 사업내용

① 안전확보 사업 : 생활방범시설, 재해예방공사

② 생활인프라 정비 : 주민공동이용시설, 골목길 정비, 주차장·텃밭조성

③ 노후주택 정비 : 집수리 지원사업, 공·폐가 철거, 슬레이트 지붕개량

④ 주민역량강화 사업 : 주민리더 발굴 및 역량강화, 공동체사업 발굴 및 운영

□ 추진상황

○ 안전확보 사업

- 생활방범시설(보안·가로등 80개, CCTV 6개) 완료	: '21. 8.

○ 집수리 지원사업 추진	: '22. 4.

- ’22년도 집수리 정비사업(28가구) 실시설계 완료

○ 생활 인프라 개선

- 거점공간 부지 매입(3필지, 620㎡) 완료	: '22. 2.

- 쉼터 및 텃밭 조성공사 착공	: '22. 5.

- 골목길 정비사업 착공	: '22. 5.

- 거점공간 실시설계 용역 착수	: '22. 6.

□ 금후계획

○ 쉼터 및 텃밭 조성, 골목길 정비사업 준공	: '22. 7.

○ ’22년 집수리 지원사업(28가구) 추진	: '22. 7.∼

○ 거점공간 조성 공사 추진	: '22. 10.∼

도 시 공 간 활 성 화 팀

동완산동 새뜰마을 조성사업

○ 재해 위험 예방 등 취약한 마을 주거환경을 개선하여 기초생활 인프라 확충 및 지속가능한 생활여건 조성으로 주민 만족도 제고

□ 사업개요

○ 위치/면적 : 완산구 곤지산3길 일원 / 30,643㎡

○ 사업기간 : 2021년 ∼ 2024년 (4개년)  ·국토부 공모선정 : '21. 3.

○ 총사업비 : 4,187백만원(국 2,900 도 386 시 901)

- '22년 예산 : 1,091백만원(국 755 도 101 시 235)

○ 사업내용

① 안전확보 사업 : 생활방범시설, 재해예방공사

② 생활인프라 정비 : 주민공동이용시설 조성

③ 노후주택 정비 : 집수리 지원사업

④ 주민역량강화 사업 : 주민리더 발굴 및 협의체 운영, 주민공동체 설립 지원

□ 추진상황

○ 우선사업 승인 (국토교통부)	: '21. 3.

- 주택정비, 안전확보, 주민공동이용시설 조성 등

○ 마스터플랜 수립 및 실시설계 용역 추진	: '21. 12.∼

○ 안전확보 사업

- 우선사업(위험옹벽 및 담장) 착공	: '22. 6.

○ 집수리 지원사업 추진

- 집수리(1차) 선정위원회 개최(21가구 선정)	: '22. 6.

○ 생활 인프라 개선

- 거점공간 부지 토지매수 협의(4필지)	: '22. 4.∼

□ 금후계획

○ 우선사업(안전확보) 추진	: '22. 7.∼12.

○ 집수리(21가구) 정비사업 실시설계용역 추진	: '22. 7.∼8.

○ 거점공간 부지 협의매수 추진	: '22. 7.∼12.

○ 마스터플랜 최종(안) 승인(국토교통부)	: '22. 9.

경제기반형뉴딜추진단

덕진권역 경제기반형 도시재생 뉴딜사업

○ 덕진권역 일대를 메타버스 중심 첨단 디지털 문화콘텐츠 산업 거점으로 조성하여 새로운 일자리 창출 및 지역 경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 위치/면적 : 덕진구 권삼득로 308 일원 / 498,000㎡

○ 사업기간 : 2022년 ∼ 2027년 (6개년)

○ 사 업 비 : 55,570백만원(국 25,000 도 4,200 시 26,370)

○ 사업내용

① 메타버스 아이디어 플랫폼(I-Town) 구축을 통한 창업지원

- 실내체육관 부지 내 청년창업 Hub, 공공커뮤니티 Hub 조성

② 메타버스 사업화 실증 단지(S-Town) 조성을 통한 산업 육성

- 기업 입주공간, 기업 컨설팅센터, 콘텐츠 개발실, 공동 장비실, 메타버스 체험관, 전시·홍보관 등 조성

③ 창업지원주택 조성을 통한 창업자 정주여건 조성

- 메타버스 기술 관련 인재 유치를 위한 창업자 정주여건 조성

④ 저탄소 친환경 문화특화거리 조성을 통한 지역 경제 활성화

- 전북대 구정문 상가 주변 스마트 가로등·버스정류장 설치, 빈점포 소규모창업지원 등

□ 추진상황

○ 도시재생특별위원회 심의 및 공모 선정(국토부)	: '21. 12.

○ 유관기관 사업설명 및 역할분담 등 업무 협의	: '22. 2.

○ 도시재생위원회 심의 사전 협의(전북도)	: '22. 3.∼4.

○ 도시재생활성화계획 승인(전북도) 및 고시	: '22. 5.

□ 금후계획

○ 전문가 자문단 구성 및 유관기관 협약 추진	: '22. 7.

○ 거점공간 기본 및 실시설계용역 추진	: '22. 8.∼

종합경기장재생과  소 관

□	전주 종합경기장 부지개발(MICE인프라 구축)	----	13
□	전주 육상경기장 증축 및 야구장 건립사업	----	14
□	옛 대한방직 부지 개발사업 추진	----	15

1963기획팀, 컨벤션시설팀

전주 종합경기장 부지개발(MICE인프라 구축)

○ 전주 종합경기장 부지 내 노후화된 경기장 시설을 이전하고 MICE산업을 이끌어갈 전시컨벤션, 호텔 건립으로 새로운 성장거점 구축

□ 사업개요(추진방향)

○ 사업기간 : 2021년 ∼ 2027년 (7개년)

○ 위    치 : 전주시 덕진구 기린대로 451 일원

○ 사업규모 : 종합경기장 부지개발 120,715㎡

○ 사업내용

- (재정사업) 도시숲 조성, 문화시설(문화원형콘텐츠체험전시관, 미술관) 건립

- (민자사업) MICE시설 인프라 구축

• (기부) 전시컨벤션센터(부지면적 50,000㎡이상, 전시면적 10,000㎡이상)

• (양여 또는 임대) 호텔 및 백화점

○ 총사업비 : 3,856억원 정도(재정 856, 민자 3,000)

- (재정사업) 856억원(도시숲 180, 문화원형 326, 미술관 350)

- (민자사업) 3,000억원(전시컨벤션센터) ※ 호텔, 백화점은 제외

□ 추진상황

○ 종합경기장 부지 무상 양여(전라북도 ⇨ 전주시)	: '05. 12.

○ 민간사업자(롯데쇼핑) 협약체결(기부대양여 방식)	: '12. 12.

○ 사업계획변경 협의(기부대양여→장기임대)	: '19. 04.

○ 기본구상 및 타당성조사ㆍ중앙투자심사 완료	: '20.~'22. 3.

※ 전북마이스발전협의회 등 자문의견 : 전시장 규모 확대 및 복합개발 필요

□ 문제점 및 대책

○ MICE산업 경쟁력 확보를 위해 대규모 컨벤션센터 건립 필요

□ (사업규모, 추진방식, 재원확보방안) 롯데쇼핑과 협의를 통해 합리적 방안 강구

□ 금후계획

○ 민자사업계획 변경 협의(롯데쇼핑) 및 개발계획 수립	: '22. 7.~12.

○ 중앙투자심사(재심사), 의회동의 및 협약변경 체결	: '23. 1.~12.

○ 도시관리계획 변경 및 기본ㆍ실시설계 추진	: '23.~'24.

○ 종합경기장 부지개발 공사추진	: '25.~'27.

경기장이전팀

전주 육상경기장 증축 및 야구장 건립사업

○ 노후된 현 종합경기장 및 야구장 기능을 대체하고 쾌적한 체육시설을 조성하여 시민의 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019년 ∼ 2025년 (7개년)

○ 위    치 : 전주시 덕진구 온고을로 644 일원

○ 사 업 비 : 900억원(국비 90, 시비 540, 지방채 270)

○ 사업기간 : 부지면적 122,645㎡

- 1종 육상경기장 1식(10,000석, 연면적 8,530㎡, 지하1/지상3층)

- 야구장 1식(8,000석, 연면적 7,620㎡, 지하1/지상2층)

□ 추진상황

○ 2019년 지방재정 투자심사 완료	: '19. 7.

○ 편입토지(14필지) 매입 및 국유지(3필지) 무상귀속 완료	: '19. 8.∼'21. 5.

○ 건축 설계공모 등 각종 용역 추진	: '19. 11.∼

○ 전문가 자문단 운영(자문위원 7명)	: '20. 7.∼

○ 의회 간담회	: '21. 1. 15.

○ 실시설계용역 착수	: '21. 6.∼

○ 건축 인허가 협의 추진	: '21. 7.∼

○ 설계용역 중간보고회	: '21. 10. 13.

○ 야구장건립 예산 국비(90억) 확보	: '21. 12.

○ 실시설계 경제성검토(VE) 완료	: '22. 5. 4.

○ 기술자문위원회 자문 완료(공사기간 적정성)	: '22. 6. 17.

□ 금후계획

○ 실시설계용역 완료	: ∼'22. 7.

○ 행정절차 이행	: ∼'22. 7.

○ 공사 발주 및 사업완료	: '22. 8.∼'25. 2.

개발사업팀

옛 대한방직 부지 개발사업 추진

○ 옛 대한방직 부지관련 시민공론화위원회 권고에 따라 도시계획변경에 대하여

토지소유자와 협의하여 합리적인 개발계획을 수립하고자 함

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 완산구 유연로 220 일원 (전북도청 뒷편)

○ 면    적 : 14필지 / 230,565㎡

○ 용도지역 : 주거용지(도시기본계획), 공업지역(도시관리계획)

○ 소 유 자 : ㈜자광 216,464㎡(93.9%), 도 6,228㎡(2.7%), 시 7,873㎡(3.4%)

□ 추진상황

○ 대한방직 전주공장 건설(공업지역)	: '72.∼'74.

○ 대한방직 소유권 이전(대한방직→(주)자광)	: '17. 10.

○ 사업계획서 사전협의 신청 및 회신(민간제안자→시)	: '18. 5.

- 각계 각층의 전문가와 시민의견을 수렴/전북도 사전협의 필요

○ 주민제안(지구단위계획) 신청서 제출 및 수용불가 회신	: '18. 11.

- 도시기본계획 불부합, 재산관리청(전북도)의 의견 불명확

○ 정책제안서 제출(민간제안자→시)	: '19. 3.∼5.

○ 사전준비위원회 및 시민공론화위원회 운영	: '20. 2.∼'21. 5.

○ 시민공론화위원회 권고문 제출(위원회→시)	: '21. 2.

○ 권고사항 통보(시→민간제안자)	: '21. 3.

○ 정책제안서 취하원 제출(민간제안자→시)	: '21. 3.

○ 권고문 통보에 관한 회신(민간제안자→시)	: '21. 4.

- 권고사항 반영하여 개발계획 수립

○ 국토계획법 개정/시행	: '21. 1./ '21. 7.

○ 전주시 도시계획조례 개정	: '21. 11.

○ 사전협상운영지침에 따른 계획 및 개발이익 관련 자문추진	: '22. 3.∼

□ 금후계획

○ 전주시 도시계획 변경 사전협상 운영지침 수립(생태도시계획과)	: '22. 10.∼

- 시의회 간담회 개최, 관련기관(부서)협의, 법제부서 법제심사 등

○ 옛 대한방직 부지 협상대상지 신청서 제출(민간제안자→시)	: '22. 11.

○ 관계기관(부서)협의 및 실무검토	: '22. 12.∼

뉴딜추진과  소 관

□	미래성장동력 「전주형 뉴딜」 추진	----	17
□	스마트 그린도시 조성사업 추진	----	18
□	소상공인 실시간 소통판매공간(소담공간 전주) 구축·운영	----	19

지역균형뉴딜팀

미래성장동력「전주형 뉴딜」추진

○ 한국판 뉴딜 정책을 지역기반으로 확장하고 지역의 여건과 특성을
반영하여 미래 발전을 견인할 전주형 뉴딜 추진

□ 추진방향

○ 한국판 뉴딜 2.0 등 정부정책에 맞추어 디지털, 그린, 휴먼 뉴딜을 중심으로 시정 핵심과제와 연계 추진

○ 한국판 뉴딜을 지역기반으로 확장하여 우리 시 여건과 특성에 맞는 지역균형 뉴딜사업 발굴 및 추진

□ 추진상황

○ 뉴딜정책에 대한 추진력 확보를 위해 전담조직 구성

- (’21) 뉴딜팀(뉴딜추진단, 디지털(스마트시티과), 그린(맑은공기에너지과)) → (’22) 뉴딜추진과

○ 2022년 전주형 뉴딜 실행계획 수립	: ’22. 3.

- 156개 사업(디지털 38, 그린 67, 휴먼 51) 발굴

○ 분야별 뉴딜사업 점검 및 관리(2회)	: 분기별

○ 정부정책, 시 주요사업과 연계한 공모사업 대응 및 사업발굴 : ’22. 3. ∼

- 행안부지자체간 협력 뉴딜사업, 지역균형뉴딜 사업발굴, 과기부지역특화 메타버스 서비스 개발 등

□ 금후계획

○ 전주형 뉴딜 실행계획 재정비	: ’22. 7월중

- 새 정부 국정과제, 민선8기 공약사업 등 반영하여 보완

○ 국정과제, 공약사업 연계 국가예산사업 발굴	: 연중

- 디지털 경제(메타버스, 디지털 플랫폼 등 신산업 육성), 탄소중립 실현 등 주요 국정과제 연계 사업 당위성, 필요성 논리보완 지원

○ 전주형 뉴딜사업 추진상황 점검 및 관리	: 연중

- 사업추진 문제점 보완, 제도개선사항 수렴 및 건의 등

그린뉴딜팀

스마트 그린도시 조성사업 추진

○ 산단 배후지역 기후변화 대응력을 높이고, 지속가능한 삶터로서의 원동력 마련을 위해 주민이 체감할 수 있는 스마트 녹색 도시로 전환

□ 사업개요

○ 사업기간 : ’21. 3. ∼ ’22. 12.

○ 사 업 비 : 15,472백만원(국 9,272 도 1,408 시 4,792)  ※환경부 공모선정('20.12.)

○ 사업위치 : 전주시 덕진구 팔복동 1가 일원(255,228㎡)

○ 사업내용

- 쿨링 앤 클린로드 조성(빗물활용 자동살수시스템, 빗물정원 조성 등)

- 물순환 청정길 조성(투수블럭 포장, 공영주차장 조성, 신복1길 정비 등)

- 공공건물 그린 리모델링, 스마트 쉘터, 스마트 가로등 교체, 쓰레기 배출시설 개선

□ 추진상황

○ 쿨링 앤 클린로드 조성사업 기본 및 실시설계 용역	: ’21. 7. ∼

○ 물순환 청정길 조성사업 기본 및 실시설계 용역	: ’21. 9. ∼

- 공영주차장 조성 실시설계 용역 완료(’22.2.∼6.), 조성공사 착공(’22.6.)

- 신복1길 정비사업 기본 및 실시설계 용역 시행(’22.4.∼8.)

○ 공공건물(팔복동 주민센터) 그린 리모델링 추진	: ’21. 11. ∼

- 기획설계 및 구조안전진단 용역 완료(’21.11.∼12.), 기본 실시설계 용역 완료(’22.1.∼6.)

○ 스마트 쉘터(스마트 버스승강장) 조성	: ’21. 10. ∼

- 2개소(팔복근린상가, 팔복주유소) 완료(’22.4.)

□ 금후계획

○ 쿨링 앤 클린로드 조성 공사 추진	: ’22. 7. ∼ 12.

○ 물순환 청정길 조성 공사 추진	: ’22. 7. ∼ 12.

- 공영주차장 조성 공사(∼’22.8.) / 신복1길 정비사업 설계용역(∼’22.8.), 공사(’22.9.∼12.)

○ 공공건물(팔복동 주민센터) 그린 리모델링 추진	: ’22. 7. ∼ 12.

○ 스마트 쉘터(스마트 버스승강장) 추가 조성(2개소)	: ’22. 7. ∼ 8.

○ 스마트 가로등 교체 및 쓰레기 배출시설 개선	: ’22. 7. ∼ 12.

디지털뉴딜팀

소상공인 실시간 소통판매공간(소담공간 전주) 구축·운영

○ 소상공인의 온라인 디지털 대전환 지원을 위한 전문기관 구축 및 비대면 판매지원 산업 경쟁력 강화

□ 사업개요

○ 사업기간 : ’21. 5. ∼ ’25. 12.(5개년)

○ 사 업 비 : 4,720백만원(국 3,400 시 1,320)

- ’21년(1차년도) 17.2억원, ’22년∼’25년 30억원(국 24, 시 6) / 매년 7.5억원

○ 사업위치 : 전주시 덕진구 서귀로 107(팔복공원 내), 지상1층∼2층

○ 사업대상 : 지역 소상공인 및 전통시장 상인 등

○ 사업내용 : 디지털커머스 인프라구축 및 소상공인 디지털전환 지원 등

□ 추진상황

○ 소상공인 디지털전환 교육 및 제작지원	: ’21. 8. ∼ ’22. 2.

- 교육 프로그램 운영 : 70명 수료(온라인상점개설, 라이브방송 등)

- 디지털전환 콘텐츠 제작 지원 : 992건(상품 소개페이지 567, 라이브방송 425)

○「소담공간 전주」구축 및 개소식	: ’22. 4. 12.

- 소담공간 전주 인프라 : 스튜디오(5개소), 장비(21종/125대) 등

○ 소상공인 단체 시설견학 및 전통시장 상인회 등 방문홍보	: ’22. 4. ∼ 5.

○ 소상공인 단체* 사업설명회 및 업무협약 체결	: ’22. 6. 16.

* 소상공인연합회 전주시지회, 전주시상인연합회, 전주시중소기업인연합회, 바이전주우수업체협의회, 전주수공예사회적협동조합, 사회적협동조합 전주사회적경제네트워크

□ 금후계획

○ 지역 소상공인 및 관련기관 등 시설 견학	: 수시

○ 소상공인 맞춤형 교육 프로그램 운영	: ’22. 7. ∼ 12.

- 기초/심화, 시니어, 실습, 찾아가는 시장상인 특화 교육 등

○ 소상공인 디지털전환 콘텐츠 제작 지원	: ’22. 7. ∼ 12.

- 온라인 상품 소개페이지 제작지원, 라이브방송 제작 및 장비 지원 등

○ 중소벤처기업부 사업연계 기획전 추진	: ’22. 9. / 12.

- 대한민국 동행세일(’22.9.), 크리스마스마켓(’22.12.) 등