제406회 전주시의회 제2차 정례회

2023년도 행정사무감사

행정사무감사특별위원회

2023년도

행정사무감사자료

	광역도시기반조성실

목        차

□ 자  료  목  록   ………………   1P

□ 자  료  내  용   ………………   3P

□ 해당없는 자료목록  ……………… 103P

□ 행정사무감사자료 별지    ………… 107P

자   료   목   록

자료번호	자 료 명	쪽	소관부서
1	의회의 시정, 건의 요구사항 처리결과	3∼21	종합경기장개발과 재개발재건축과 도시개발과 도시정비과
3	이월사업 현황	22∼28	종합경기장개발과 재개발재건축과 도시개발과 도시정비과
4	투융자심사사업 추진현황	29	종합경기장개발과 도시정비과
8	기금적립 및 운용 현황	30∼31	재개발재건축과 도시개발과
9	집단민원 처리 상황(20인 이상)	32	재개발재건축과 도시개발과
10	소송업무 수행현황	33∼36	종합경기장개발과 재개발재건축과 도시개발과
11	행정심판 청구내역	37	재개발재건축과
12	수의계약 체결현황	38∼41	도시개발과 도시정비과
13	건설공사 집행내역(도급액 5천만원 이상)	42∼47	종합경기장개발과 도시개발과 도시정비과
14	공사 설계변경 내역(5백만원 이상)	48∼52	종합경기장개발과 도시개발과 도시정비과
15	용역비 집행내역 【중지된 용역(사유명기) 포함】: 1천만원 이상	53∼62	종합경기장개발과 재개발재건축과 도시개발과 도시정비과
21	연구개발비 집행현황	63	재개발재건축과
22	민간경상보조 집행현황	64∼65	도시정비과
24	민간위탁 시설별 현황	66	도시정비과
28	5천만원이상 사업 불용액 현황	67	도시정비과
29	전주시 전시컨벤션센터 운영계획 수립	68	종합경기장개발과
30	전주 종합경기장 부지개발 사업(MICE 복합단지 조성)	69	종합경기장개발과
31	전주 육상경기장 및 야구장 건립사업	70	종합경기장개발과
32	옛 대한방직 부지 개발사업	71	종합경기장개발과
33	재개발·재건축사업 현황(지구별 작성)	72∼75	재개발재건축과
34	소규모 주택정비사업 추진	76∼79	재개발재건축과
35	지역주택조합 주택건설사업 추진	80	재개발재건축과
36	주택건설 통합심의 공동위원회 운영결과	81	재개발재건축과
37	노후 공동주택 관리비용 지원사업	82∼84	재개발재건축과
38	공동주택 주민참여예산 지원사업	85∼87	재개발재건축과
39	소규모 공동주택 생활환경개선 지원사업	88∼91	재개발재건축과
40	전주교도소 이전·신축사업 및 이주단지 조성사업	92	도시개발과
41	에코시티 2단계 조성사업	93	도시개발과
42	전주대대 이전사업	94	도시개발과
43	천마지구 도시개발사업	95	도시개발과
44	전주역세권 복합개발사업	96	도시개발과
45	효천지구 연계도로 확장사업	97	도시개발과
46	도시재생 뉴딜사업 추진	98	도시정비과
47	새뜰마을 조성사업 추진	99	도시정비과
48	도시재생사업 거점시설물 운영·관리	100	도시정비과
49	팔복동 빈집밀집구역 재생사업	101	도시정비과
50	도심빈집정비 주민공간 조성사업	102	도시정비과
51	노후 시설물 정비를 통한 생활SOC 확충사업	102	도시정비과

자료번호 : 1        작성자 : 종합경기장개발과장 김용삼 (인)

자 료 명 : 의회의 시정, 건의 요구사항 처리결과

구 분	시정, 건의사항		처리사항	미 처리사유
	의 원	내 용
제397회 제2차 정례회 행정사무감사	박선전	◦미래유산 취소시 시민의견 수렴 또는 철거에 대한 합당한 이유와 필요성에 대해 검토바람	◦ ’23.10.11 미래유산 보존위원회 심의를 통해 미래유산 명칭을 ‘경기장 터’로 변경하였으며 종합경기장 기록화, 기억공간 마련 등 관계부서와 지속협의 하겠음
제397회 제2차 정례회 행정사무감사	박선전	◦대한방직 부지개발 사업 조속추진	◦사전협상 운영지침에 따라 협상대상지 선정 절차 진행중
제397회 제2차 정례회 행정사무감사	박선전	◦종합경기장 개발사업은 전면 재검토하는 것인지?	◦종합경기장 개발사업을 전면 재검토하는 것은 아니며, 기존의 부지재생사업을 기반으로 부가가치가 높은 전시컨벤션 산업 중심으로 개발할 계획임
제397회 제2차 정례회 행정사무감사	이 국	◦야구장 철거후 활용 계획은?	◦가맥축제, 비빔밥축제 등 시민문화축제 행사장으로 활용중임
제397회 제2차 정례회 행정사무감사	이 국	◦개발방향 변경시 시민참여단의 의견을 수렴하였는지?	◦시민참여단 운영은 개발방식에 대한 자문성격이 아닌 주제숲 구상에 대한 의견을 수렴한 사항으로 추후 구체적인 사업계획 수립시 시민의견 수렴할 계획임
제397회 제2차 정례회 행정사무감사	이 국	◦시장님과 자광대표 면담관련	◦석면건축물인 폐공장 철거요청, 개발이행에 대한 부분, 소상공인 상생방안, 지역건설업체 참여와 교통혼잡 해소방안 및 상권 부작용 최소화 방안마련 등이 필요함 설명
		◦대한방직과 종합경기장 개발 시 지역상권 보호 대비책 필요	◦대규모점포등록 과정에서 ‘지역상생협력방안’ 및 ‘상권영향분석’을 통해 지역소상공인과 지역상권에 미치는 영향이 최소화 되도록 세밀하게 살펴보겠음
제397회 제2차 정례회 행정사무감사	이 국	◦종합경기장, 대한방직에 대규모 쇼핑몰 건립 시 지역상권 몰락이 우려되는데 이에 대한 대책은?	◦관계부서(민생경제과)와 면밀한 협의를 통해 지역상권 안정화 도모 예정
제397회 제2차 정례회 행정사무감사	이 국	◦타지역 컨벤션센터 운영시 적자발생 여부에 대하여 확인하기 바람	◦전시컨벤션센터 운영계획을 수립하기 위한 연구용역을 추진중이며 전북마이스뷰로, 마이스협회 등 전문가 자문 및 용역 추진을 통해 운영비용 최소화 방안을 마련하겠음
제397회 제2차 정례회 행정사무감사	김원주	◦협약서의 유효기간은 있는지? -협약서 제6조 관련	◦전주시 고문변호사 법률 자문결과 협약서 제6조제2항은 사업기간을 의미하는 것으로 협약서 유효기간은 없음
제397회 제2차 정례회 행정사무감사	김현덕	◦미래유산1호인 종합 경기장, 야구장 철거에 대한 대책은?	◦10.11 미래유산 보존위원회 심의를 통해 미래유산 명칭을 ‘경기장 터’로 변경하였으며 종합경기장 기록화, 기억공간 마련 등 관계부서와 지속협의 하겠음.
제397회 제2차 정례회 행정사무감사	김현덕	◦세계육상연맹 및 대한 육상연맹 대회 개최에 대한 자료 제출	◦대한육상연맹 규정 상 관람석 수에 관한 규정은 없으며, 대한육상연맹 측 설계도서 관련 검증 완료 ◦대한육상연맹 규정 자료 제출완료 (＇22.11.28.)
제397회 제2차 정례회 행정사무감사	김현덕	◦사업추진 과정에서 시민의견을 수렴한 적이 있는지?	◦2012년 타당성조사, 2014년 지역상권영향분석, 2016년 원탁회의, 2020년 기본구상 등 사업추진 과정에서 시민들의 의견을 수렴하여 사업계획에 반영하였음
제397회 제2차 정례회 행정사무감사	양영환	◦대한방직과 종합경기장 사업내용 중복문제	◦기존상권에 미치는 영향 등을 고려하여 사업계획을 면밀히 검토할 예정이며, 향후 시의회와 협의하여 사업내용 확정하도록 하겠음
제397회 제2차 정례회 행정사무감사	천서영	◦육상경기장 국제 경기 유치 가능 여부	◦현재 관람석 10,000석으로 설계, 추후 가변석 설치로 15,000석까지 확보하여 국제대회 유치 가능
		◦대회 개최 시 교통대책	◦＇17년 개최한 U-20 월드컵과 같이 주변 학교, 노상주차장 등을 활용하고 추가로 장동 운동장 내 주차장 확보 계획이 있으며, 교통영향평가 완료함
		◦대회 개최시 이용자 안전 대책 설계 반영 여부	◦선수와 관람객 동선을 분리하여 설계에 반영하여 안전확보 대책을 수립
제397회 제2차 정례회 행정사무감사	천서영	◦대한방직 부지 개발 관련 타지역 사례 검토	◦ 대한방직 부지 개발과 관련하여 개발사업에 대한 다양한 타지역 사례 검토하였음 - 군산시(페이퍼코리아 이전개발), 광주광역시(전방,일신방직 이전개발), 부산광역시(한진CY부지개발) 등
제397회 제2차 정례회 행정사무감사	최명철	◦대한방직 부지 개발 관련 진행사항	◦사전협상 운영지침 지침에 따라 개발계획을 면밀히 검토하여 관련부서(기관) 협의 및 도시계획위원회, 도시건축공동위원회 자문 등의 절차이행 예정임
제397회 제2차 정례회 행정사무감사	최명철	◦협약서 내용과 다르게 육상경기장 및 야구장을 시에서 건립하는 것은 잘못된 것으로 보이는데 그 사유는?	◦최초 협약체결 시 육상경기장 및 야구장은 민자사업이었으나, 시민의숲 추진과정에서 2015년 7월 의회 동의를 거쳐 육상경기장과 야구장을 재정사업으로 추진하게 되었음
제397회 제2차 정례회 행정사무감사	최명철	◦종합경기장 개발 관련하여 롯데쇼핑에서 해왔던 일은 무엇인지?	◦롯데쇼핑은 최초 공모에 참여할 당시 사업제안서를 작성ㆍ제출 하였고, 그 후 사업추진과 관련하여 우리시와 지속적으로 협상을 통해 변경협약안을 마련하였음
제397회 제2차 정례회 행정사무감사	최명철	◦협약해지시 발생 되는 문제점은 무엇인지? ◦간담회를 통해 롯데와 협의 진행사항 설명 바람	◦협약해지와 관련하여 변호사 자문결과, 일방적인 해지는 불가하다는 의견이었으며, 협약 해지 시 손해배상, 행정신뢰성 실추, 시민질타 등 우려됨 ◦간담회를 통해 롯데와 협의 진행사항을 설명하였으며, 사업계획 변경 및 변경협약(안)이 의회 의결됨
제397회 제2차 정례회 행정사무감사	최용철	◦도시계획변경 사전협상 자문단 운영 예산 집행 저조	◦도시계획변경 사전협상 운영지침이 ’23.9월말 제정되어 협상조정협의회 구성 및 협상대상지 선정 등의 행정절차를 이행하여야 하므로 연내 예산집행이 어려움
제397회 제2차 정례회 행정사무감사	최용철	◦행안부 중앙투자심사결과 4가지 조건사항에 대한 처리결과는?	◦유치전략 및 운영활성화를 위한「전주시 전시컨벤션센터 운영계획 수립용역」발주 ◦민간사업자와 사업추진방식 등 세부사업 내용에 대한 협의를 통해 변경 협약서(안)마련 하여 의회 동의를 거쳤음 ◦중앙투자 재심사 등 행정절차 예정
제397회 제2차 정례회 행정사무감사	최용철	◦롯데쇼핑(주)은 외국인투자기업이 아니므로 장기임대를 할 수 없고, 사업을 추진하려면 기부대양여 방식으로 갈 수밖에 없는데, 다시 예전처럼 기부대양여방식으로 검토하고 있는지?	◦육상경기장과 야구장을 재정사업으로 진행함에 따라 기부대양여방식 적용이 불가능하므로 대물변제 방식을 통해 사업을 추진할 계획임
제397회 제2차 정례회 행정사무감사	최용철	◦도민일보와 회견에서 호텔은 투자심사시 4성급으로 받았으나 시장님은 5성급으로 건립하고 싶어하시는거 같은데 이에 대한 집행부의 의견은?	◦호텔은 마이스산업의 필수지원시설로 5성급 호텔 건립에 대해 롯데와 협상결과 건축비, 운영비 등 과다하여 4성급 이상, 200실 이상 건립하는 것으로 협의됨
제397회 제2차 정례회 행정사무감사	최용철	◦종합경기장 개발사업 등 대규모 사업의 경우는 중장기적 계획을 수립하여 체계적으로 추진될 수 있도록 하기 바람	◦대규모사업에 대해서는 중장기적 관점에서 계획을 수립하여 추진하도록 노력 하겠음
제398회 임시회 주요업무계획 보고	이 국	◦전북교육청과 전주시 협약 관련하여 미래교육캠퍼스 사업이 확정되지 않았는데 너무 서둘러서 업무협약을 체결한 것은 아닌지?	◦미래교육캠퍼스 설립사업은 교육감 공약사업으로 현재 중앙투자심사 조건부 승인을 받았으며, 시립미술관 부지가 협소하여 미래교육캠퍼스 부지 일부를 야외미술관으로 활용하기 위한 우리시 제안을 교육청에서 받아들이면서 업무협약을 체결하게 되었음
제398회 임시회 주요업무계획 보고	김성규	◦ 사망한 외국인 노동자는 불법체류자로 고용 시 신분확인을 하지 않고 사업을 하였는가? ◦ 안전사고에 대한 관리, 감독이 필요함	◦㈜자광은 발주처이며 사망한 외국인 노동자는 시공자인 유림개발에서 고용하였음 ◦ 노동자 사망사고 관련하여 철거업체 관계자 2명이 불구속 송치되었으며 유가족들과 합의도 완료되었음 ◦㈜자광에게 안전관리대책을 철저히 수립하도록 통보하였음
제398회 임시회 주요업무계획 보고	양영환	◦대한방직 부지개발사업 추진상황은?	◦도시계획변경 사전협상 운영지침이 수립되어 민간제안자가 협상대상지 선정 신청을 하였으며 지침에 따라 사업계획을 면밀히 검토하여 행정절차를 진행할 예정임
제398회 임시회 주요업무계획 보고	양영환	◦ 대한방직 건축물 철거공사 진행이 늦어지는 이유는?	◦건축물 철거허가 조건사항인 맹꽁이 서식 관련하여 전북지방환경청 으로부터 포획 및 방사허가 승인을 받아 대체서식지(오송제)로 10월말까지 이주완료 하였으며, 안전관리대책이 이행되는 대로 착공신고가 수리될 예정임
		◦ 석면 등 시민의 안전을 위해 조속히 철거해야 함
제398회 임시회 주요업무계획 보고	최명철	◦맹꽁이 서식이 확인된 것인지,실태조사 완료까지 건축물 철거는 할 수 없는 것인지? ◦ 안전사고가 재발되지 않도록 철저한 관리, 감독이 필요함	◦맹꽁이 서식이 확인되어 전북지방환경청으로부터 포획,방사허가를 받아 대체서식지(오송제)로 10월말까지 이주완료 하였으며, 안전관리대책이 이행되면 착공신고가 수리될 예정임 ◦㈜자광에게 안전관리대책을 철저히 수립하도록 통보하였음
제398회 임시회 주요업무계획 보고	천서영	◦육상경기장 및 야구장 건립 관련 공사 발주 진행상황?	◦(1차분)공사 발주 후 기존건축물 해체공사 및 건축·전기·통신·소방공사 발주 완료하였으며 현재 건립공사 착공하여 공사 진행 중임
제398회 임시회 주요업무계획 보고	천서영	◦육상경기장에 좌석수가 10,000석으로 되어있는데 부족한거 아닌지?	◦국제대회나 전국체전시 가변석 7,000석 설치 가능하도록 설계에 반영
제398회 임시회 주요업무계획 보고	천서영	◦종합경기장 개발사업과 관련하여 금년 4월에 사업계획변경에 대한 의회동의 및 협약 변경 체결한다고 하는데 현재 사업 진행 상황은?	◦현재 사업계획 변경 및 변경협약서(안)에 대한 의회 동의가 완료되었으며, 롯데쇼핑과 일정협의를 통해 변경협약을 체결할 계획임
제398회 임시회 주요업무계획 보고	최용철	◦야구장 철거부지에 대한 구체적인 활용 계획은 있는지?	◦시민문화축제의 행사공간으로 임시 활용계획이나, 장기적으로 문화정책과에서 한국문화원형 콘텐츠 전시□체험관과 시립미술관 건립을 추진할 계획임.
제398회 임시회 주요업무계획 보고	최용철	◦계약심의 완료에 대해 추가적으로 설명 요구	◦총액·장기계속·조달계약으로 지역 의무 공동도급은 49%이상으로 함
		◦관급자재 구입시 선정기준	◦10억이상시 조례에 따라 계약심의 후 결정
제399회 임시회 시정질문	한승우	◦해체허가일에 착공식이 이루어질수 있는지? ◦자광의 불법철거계획에 대하여 사전에 인지하고 있었는지?	◦착공식은 법적인 행위가 아닌 만큼 건축물 해체공사와 관계없이 토지주가 일정을 계획한 것으로 허가일과 착공일은 무관함 ◦석면해체는 고용노동부 전주지청에 신고를 완료하고 건축물해체는 우리시에서 허가를 받음. 다만 석면해체의 경우 신고만 하면되지만 건축물 해체는 허가를 받은후 착공신고를 거쳐야하며 일부구간은 건축물인 벽체가 석면으로 되어있어 석면해체시 착공신고 없이 석면과 벽체를 동시에 해체한 것으로 우리시에서는 사전에 이를 확인할 수 없었고 인지한 즉시 고발조치함
제403회 임시회 주요업무 추진상황 보고	박선전	◦전시컨벤션센터 운영계획 수립용역 발주 전 의회와 소통할 것	◦’23.8.21 MICE산업 전문가, 관계자 간담회를 통해 용역과제를 보완후 용역 발주하였음.
제403회 임시회 주요업무 추진상황 보고	이 국	◦종합경기장 내 많은 사업들이 과밀하게 계획되어 있으며, 또한 인근에 대단지 아파트 건설이 예정되어 있어, 주차대란, 인구 대란 등에 대한 사전 대책 마련 필요	◦「전주시 전시컨벤션센터 운영계획 수립 용역」을 발주하여 전시컨벤션센터 건립에 따른 유발인구 및 수요인원 등을 분석하고 있으며, 향후 본사업 추진 시 각종 제영향평가(교통, 환경, 재해 등)를 통하여 대책 수립하겠음
제403회 임시회 주요업무 추진상황 보고	양영환	◦ 사전협상 운영지침이 완료되었는지와 대한방직 부지 내 맹꽁이 문제는 어떻게 진행되는지?	◦ 도시계획변경 사전협상 운영지침 제정됨(2023.9.21.) ◦ 실태조사 결과 맹꽁이 서식이 확인되어7월초 전북지방환경청에 포획,방사허가를 받아 대체서식지(오송제)로 10월말까지 이주완료하였음
제403회 임시회 주요업무 추진상황 보고	양영환	◦대한방직 부지 개발에 대해 종합적으로 검토하여 적극적으로 추진해 주길 바라며, 1급 발암물질인 석면을 신속히 철거해 주길 바람	◦맹꽁이 이주 및 건축물 철거 절차를 진행함과 동시에 지침에 따라 협상에 대한 절차도 병행하여 추진하겠음 ◦석면철거는 완산구청 건축과와 함께 신속히 진행될 수 있도록 노력하겠음
제403회 임시회 주요업무 추진상황 보고	최용철	◦롯데쇼핑 사업결정과 별개로 투자심사 등 행정절차가 1년이상 소요됨에 따라 행정절차를 조속히 앞당길수 있는 방안 강구	◦LIMAC, 행안부와 사전 협의를 통해 최대한 기간단축 할수 있도록 노력하겠음 ◦또한, 전라북도특별자치도가 지정 됨에 따라 중앙투자심사 권한이양 (행정안전부→전라북도)을 요청한 상황으로, 권한이양 시 더욱 속도감 있게 추진 가능
제404회 임시회 시정질문	김윤철	◦ 프로야구단 경기 유치방안	◦야구장 관람석의 경우 약8,176석 규모로 사업을 추진중이나 향후 프로구단 유치를 대비해 고정석 약 20,000석 규모로 증축이 가능하도록 설계에 반영하였고, 한국야구위원회에서도 KBO리그경기와 퓨처스리그 일부 경기가 우리 시에서 개최될 수 있도록 적극적으로 지원하겠다는 의견 접수(’23.09.01.) KBO와 사전에 충분히 협의한 후 추진
제405회 임시회 5분발언	한승우	◦2012년 롯데쇼핑과 협약서는 의회 동의를 거치지 않았고, ◦민선 6,7기 협약 해지 절차를 통해 효력을 상실했으며, ◦사업내용, 방식 등이 완전히 바뀌었기 때문에 재공모가 마땅하므로 종합경기장 이전 사업 협약 변경은 중단되어야 함	◦지방자치법에 의거 협약서는 의회의결사항은 아니며, 당시 적법한 절차를 거쳐 체결되었음 ◦롯데쇼핑의 귀책없이 일방적인 해지를 통보하였으나, 롯데에서 해지를 원하지 않아 협약을 해지 하지 못한 상황으로 협약은 유효함 ◦변호사 및 행안부 자문결과 사업의 근본적인 목적과 내용의 동일성이 인정되어 협약변경은 타당하다는 의견에 따라 협약변경 절차를 진행하였음

자료번호 :  1         작성자 : 재개발재건축과장  국승철 (인)

자 료 명 : 의회의 시정, 건의 요구사항 처리결과

구 분	시정, 건의사항		처리사항	미 처리사유
	의 원	내 용
제397회 제2차 정례회 행정사무감사	이 국	◦지분쪼개기 관련 방지대책 마련	◦지분쪼개기 대책 -(조례개정)재개발사업 공동주택 분양대상자 기준 마련 -(고시)주택 등 분양받을 권리의 산정기준일 고시(전라중교일원, 병무청) -(제도개선)분양받을 권리의 산정기준일 고시 권한 확대 및 적용범위 확대 요청(시→국토부)
제397회 제2차 정례회 행정사무감사	이 국	◦조합 외에 정비업체에 대해서도 실태점검 필요	◦조합 및 정비업체에 대하여 실태점검 추진 중 (연 2회)
제397회 제2차 정례회 행정사무감사	김성규 김현덕 최명철	◦노후 공동주택 보조금 및 주민참여예산 공동주택지원 사업비 중복지원 검증 및 정산 철저 ◦노후 공동주택 지원 예산 확보 필요	◦중복지원 여부 확인 및 정산 철저 ◦보다 많은 단지에 관리 비용을 지원할 수 있도록 예산 추가 확보 - 2023년 본예산(2,569백만원)
제397회 제2차 정례회 행정사무감사	김원주	◦도시정비법상 정비구역 지정권자는 정비(예정) 구역을 해제할 수 있는바, 이에 대한 적극검토 요청	◦정비 예정구역 해제 검토 중 (2개소 : 효동, 성황당) - 2030 전주시 도시주거환경정비 기본계획 수립중
제397회 제2차 정례회 행정사무감사	양영환	◦재개발재건축 정비구역 조합 실태점검 대상지 현황, 점검 결과 현황?	◦관내 현재 총 28개소의 정비구역 중 사업완료 8개소, 조합미설립 10개소 제외한 10개소 대상으로 추진 중으로 ◦’22년 삼천쌍용(행정지도 19건), 기자촌구역(행정지도 14건), ’23년 감나무골(행정지도 22건, 고발 1건, 환수권고 2건),하가구역 선정하여 점검을 실시함
제397회 제2차 정례회 행정사무감사	양영환	◦조합 내부 간 분쟁 등으로 인해 고소·고발 등의 문제가 발생되지 않도록 시에서 선제적으로 대응 필요	◦분쟁 방지를 위한 대응현황 - 정비사업 아카데미 - 조합 현장방문의 날 - 조합장 간담회
제397회 제2차 정례회 행정사무감사	천서영	◦재개발재건축 민원처리 방안과 전주시의 역할은 무엇인지?	◦ 관련 자료 제출 완료 - 민원처리 · 민원인 이해·설명·중재 · 공사 민원 : 현장점검 - 전주시의 역할 · 행정절차 신속 이행
		◦민원처리 관련 시에서 중재를 통해 처리된 민원처리 사례 요청	◦ 민원처리 사례 - 감나무골 재개발정비사업 : 관계기관 협의 후 보행 통로 확보 방안 마련 - 삼천쌍용 재건축정비사업 · 소음·분진 피해에 따른 민원인 :시공사 면담을 통한 피해보상 중재
제397회 제2차 정례회 행정사무감사	최용철	◦전주시 주택공급계획은?	◦’22∼’25년, 26개단지 17,256세대 공급 예상 (관련 자료 제출 완료)
제397회 제2차 정례회 시정질문	박형배	◦지분쪼개기 방지를 위해 정비예정지구 지정 이후 조합설립, 구역지정 계획 수립 등이 3년 안에 진행될 수 있도록 하는 내부방침 수립 여부	◦(고시)주택 등 분양받을 권리의 산정기준일 고시(전라중교일원, 병무청)
제397회 제2차 정례회 시정질문	박형배	◦권리산정 기준일 이전 투기세력의 편법 쪼개기 확인 시 소급, 추징 제도 마련	◦(제도개선)분양받을 권리의 산정기준일 고시 권한 확대 및 적용범위 확대 요청(시→국토부)
제397회 제2차 정례회 시정질문	박형배	◦가칭 재개발관련 사업위원회를 운영, 검토하고 전주시에 맞는 공공관리제도 시행 계획	◦ 조합운영 실태점검 추진 -’22년 : 삼천쌍용, 기자촌 -’23년 : 감나무골, 하가
제397회 제2차 정례회 시정질문	박형배	◦전주시 소규모주택정비사업의 실태 파악 여부	◦관내 현재 총 50개소의 소규모 주택정비사업(가로주택32, 소규모재건축18)이 추진중이며 실태 파악 완료함
제397회 제2차 정례회 5분발언	이 국	◦정비구역 지정 전 정비예정구역에서 쪼개기로 인해 조합원의 재산상의 피해가 발생함에 따라 조합원의 재산권 보호를 위한 대책 마련 필요 (전라중 일원)	◦지분쪼개기 대책 -(조례개정)재개발사업 공동주택 분양대상자 기준 마련 -(고시)주택 등 분양받을 권리의 산정기준일고시(전라중교일원, 병무청) -(제도개선)분양받을 권리의 산정기준일 고시 권한 확대 및 적용범위 확대 요청(시→국토부)
제398회 임시회 주요업무계획 보고	이 국	◦학교 인근에서 정비사업 공사가 진행될 때 안전사고가 나지 않도록 주의가 필요	◦학교 인근에서 정비사업 공사시 통학로 등에서 안전사고가 발생하지 않도록 안전사고 예방에 철저를 기하겠음
제398회 임시회 주요업무계획 보고	이 국	◦도시정비아카데미 진행시 정비업체도 참여시켜 정비업체로 하여금 문제가 발생하지 않도록 조치 강구	◦조합 임원 및 정비업체 등 조합 운영 관계자에게 홍보를 통해 정비사업아카데미 참여율을 높임
제398회 임시회 주요업무계획 보고	천서영	◦지역주택조합 사업이 부진하거나 취소되는 경우 조합원이 피해를 입는 경우가 발생하므로 시에서 단속하거나 조례를 개정하는 등 대책요구	◦주택법 개정사항 정착과 조합원 피해예방을 위해 관내 추진 중인 지역주택조합 이행실태를 점검하였으며 점검결과에 따라 고발(5건) 및 시정명령(14건) 등 조치하였음
제398회 임시회 주요업무계획 보고	양영환	◦정비사업이 지연이 되는 이유와 조합원 사이의 갈등을 해소하기 위한 대응 방법은?	◦조합 내부 갈등·분쟁으로 인하여 사업이 지연되는 사례가 많아, ◦정비사업 아카데미를 통해 갈등을 사전에 방지하고, 조합운영 실태점검을 통해 조합 운영의 투명성을 제고하고 있음
제398회 임시회 주요업무계획 보고	양영환	◦지역주택조합 광고 시 층수나 시공사가 마치 확정된 것처럼 과대 광고 하는 조합에 대한 대책은?	◦조합원 모집광고 관련 주택법 준수여부 등 관내 지역주택조합 이행실태를 점검하였으며 점검 결과에 따라 고발(5건) 및 시정명령(14건) 등 조치하였음 (모집광고 관련 : 고발 3건, 시정명령 6건)
제398회 임시회 주요업무계획 보고	박선전	◦지역주택조합이 중도에 포기 및 취소되는 경우 조합원들의 피해가 막심하므로 지역주택조합 등에 대하여 행정지도 필요	◦조합설립부터 해산시까지 조합운영 등에 대하여 행정지도 및 관리·감독을 강화하여 지역주택조합 사업지연 및 취소 등으로 조합원 및 시민들의 피해가 발생하지 않도록 노력하겠음
제403회 임시회 주요업무 추진상황 보고	양영환	◦소규모주택정비사업이 관내 다수 추진되고 있으나 현재까지 착공 및 준공된 현장이 없는 이유가 무엇인지?(지연사유가 행정절차 이행 때문인지)	◦소규모주택정비사업은 비교적 행정절차가 간소화되어 있으나 조합원들 간 사업추진 타당성 검토에 따른 시간 소요, 소규모 세대수 및 공사비 상승으로 인한 시공사 선정 어려움 등으로 인해 지연되고 있는 실정임
제403회 임시회 주요업무 추진상황 보고	양영환	◦지역주택조합 허위·과대 광고로 인한 시민 피해 예방을 위해 단속 추진하고 있는지?	◦조합원 모집광고 관련 주택법 준수여부 등 관내 지역주택조합 이행실태를 점검하였으며 점검 결과에 따라 고발(5건) 및 시정명령(14건) 등 조치하였음 (모집광고 관련 : 고발 3건, 시정명령 6건)
제403회 임시회 주요업무 추진상황 보고	최명철	◦소규모주택정비사업 활성화를 위해 용적률 등 규제완화가 필요해 보이며, 보도폭 등 도로 기부채납 관련 조합과 담당 부서 이견이 있는 경우 조정 방안은?	◦용적률 등 규제 완화 -(용도지역 용적률 완화) 도시계획과에서 도시계획 조례 개정 추진 중 -(소규모주택정비사업 용적률 등 규제 완화) 기반시설 등 설치 시 용적률 완화내용을 반영한 빈집 및 소규모주택 정비에 관한 조례 제정 추진 중 ◦도로 기부채납 관련 -심의 신청 시 관련부서에 협의 및 심의를 통하여 도로폭을 정하고 있으며 소규모주택정비사업의 과도한 기부채납 부담을 지양하기 위해 부서 간 지속적으로 협의하겠음

자료번호 : 1                작성자 : 도시개발과장 장재영 (인)

자 료 명 : 의회의 시정, 건의 요구사항 처리결과

구 분	시정, 건의사항		처리사항	미 처리사유
	의 원	내 용
제397회 제2차 정례회 행정사무감사	이 국	◦ 전주교도소 이전·신축사업 진행 상황은? ◦ 이대로 진행시 일정을 맞출 수 있는지?	◦ ’23년 10월 기준 전주교도소 이전부지 보상률 72%정도임 ◦ 토지소유자와 지속 협의 노력중이며, 협의가 어려운 토지는 향후 토지수용 검토예정 ◦ 법무부에서 실시계획인가 절차 완료 후 수용절차 이행 계획
제397회 제2차 정례회 행정사무감사	김원주	◦ 전주역 지하차도 검토 진행 상황은?	◦ 사업시행자인 LH와 교통개선대책(안) 및 토지이용계획 등 사업 계획 협의 중
제397회 제2차 정례회 행정사무감사	김현덕	◦ 주변마을 진입로, 교차로 등 4차선 도로 확장해도 과속방지턱 설치 가능한지? ◦ 비아마을과 주변마을 진입 도로 등 교차로 발생에 따른 안전문제 및 버스 승강장, 횡단보도 위치 등 주민편의 고려	◦ 관련기관(완산경찰서, 도로 교통공단 등)과 협의하여 신호·과속 단속카메라 2대, 불법주정차 단속카메라 1대 설치(’23.4.), 교차로 진입로 과속방지턱 4개소 설치(’23.9.) 완료
제397회 제2차 정례회 행정사무감사	양영환	◦ 전주대대 이전사업 경과 ◦ 전주대대 이전이 어려울 경우, 불이익이 있는지?	◦ 합의각서 체결(’18년) 및 사업계획 승인(’21년) 이후 절차이행중이며, 사업계획 승인 취소 소송(’21.7.)에 따른 1심 판결(’23.5.11, 승소.) 및 항소 (’23.5.26.) 대응 중에 있음 ◦ 전주대대 이전 지연시 국방부는 현 전주대대를 현대화하여 예비군 훈련을 시행할 수 밖에 없다는 입장이며, 천마지구 미개발로 인한 배상 책임은 없음
제397회 제2차 정례회 행정사무감사	천서영	◦ 효천지구 연계도로를 비롯하여 도로공사 추진시 준공이 연말에 몰리는 사유	◦ 도로 확장구간 공사는 인접상가 및 마을접속 구간 등 여러 민원 사항이 발생하여 사업 지연되었으나, ’22년12월 공사 완료함
제397회 제2차 정례회 행정사무감사	천서영	◦ 전주역세권 복합개발사업 관련 국토부에 사업중단 요청한 세부내용과 사업자체가 중단이 되는 것인지?	◦ 사업시행자인 LH와 협의하여 사업 추진 계획이며, 교통개선대책(안) 및 토지이용계획 등 사업 계획 지속 협의
제397회 제2차 정례회 행정사무감사	최용철	◦ 공공청사 이전사업 관련 예산 집행률 부진(0%) 이유 ◦ 공공청사 상하수도본부 이전에 따른 시민불편 우려가 많은 부분에 대한 대책	◦ 3억원을 예산성립(’21년도 추경) 이후 도시관리계획 용역 추진 과정에서 농림부 측 농지전용에 대한 부정적 입장 으로 용역 지연되었으나, 전북도 농지전용 심의(’23.7.) 조건부 승인되어 용역 완료함(’23.8.) ◦ 공공청사 이전은 도도동 주민들과의 약속으로 이전 해야 하고, 민원 관련 부서는 양구청으로 분산배치 하여 해소방안 마련
제397회 제2차 정례회 시정질문	송영진	◦ 전주대대 행정소송 진행 되는 근본적인 원인	◦ 지역주민과 약속한 지역발전사업에 대한 발굴 및 협의가 장기화되면서 통합예비군훈련대 창설 지연 및 장병들의 열악한 병영생활 등을 감안한 불가피한 사업계획 승인으로 행정소송 제기 ◦ 지역주민 면담을 통해 주민 의견 수렴 및 지역발전사업 지속 협의키로 함 ◦ 지역주민 및 시의원과 실무협의회를 구성하여 지역상생 발전사업 적극 강구
		◦ 취임후 전주대대 문제해결을 위한 노력 방법 ◦ 전주대대 문제해결을 위한 타개방안	◦ ’22.10월 지역주민(대책위)과면담을 통해 전주대대 이전 협의 추진하고 지역발전사업 적극 협의하기로 함 ◦ 소송과 별개로 지속적으로 지역주민과 소통 및 협의 추진
		◦ 전주대대 행정소송에 대한 입장 표명 및 소송 추진 상황과 향후 대응계획 ◦ 도매시장 이전 이외의 다른 복안 대책	◦ 공공시설 및 수익사업 등에 대하여 상호협력하여 빠른시일내 지역발전사업 추진
제398회 임시회 5분발언	한승우	◦ 삼천 하천숲공원 조성을 위해 효천지구 연계도로 확장사업 세내교∼삼천교 구간의 설계 변경(도시계획선 변경-제방둑 인접이 아닌 제내지 활용한 선형변경) 필요	◦ 효천지구 연계도로 확장사업 추진(1단계 구간 완료) ◦ 해당구간(세내교∼삼천교) 추진시 검토하겠음
제398회 임시회 5분발언	박혜숙	◦ 천마지구 도시개발 계획을 수립하고 결단을 내렸다면 더 적극적인 소통과 협의를 통해 계획대로 이행을 촉구함	◦ 전주대대 이전사업 보상계획 공고(’23.8.) 및 보상협의회 구성·운영(’23.10.)하여 행정절차를 진행 중이며, 지역주민들과 소통과 협의를 위해 실무협의회 구성 추진중
제398회 임시회 주요업무계획 보고	김현덕	◦ 효천지구 연계도로 공사구간에 우묵실∼비아마을 진입로 주변 차량 과속으로 사고 위험이 있음, 50km 표지판은 있으나 과속카메라가 없으므로 설치 검토 바람 ◦2단계공사구간(삼천교∼해성교차로) 금후계획이 ’23∼’24년 으로 되어있는데 추진 가능한 것인지?	◦ 과속카메라 등 기타 안전 시설 설치 완료(’23.9.) ◦ ’23년 예산 30억원 확보하여 2단계 구간 보상 수용절차 진행 중이며 ’23년 12월 내 공탁 예정 2단계(삼천교∼해성교차로) 구간 예산 확보하여 계획 대로 추진될 수 있도록 적극 노력하겠음
제398회 임시회 주요업무계획 보고	김현덕	◦「백석저수지 주변 개발 기본계획 수립」 용역 완료전에 도시건설위원회에 보고해 주기 바람	◦ 관계기관(농어촌공사 등) 협의 등을 마치고 구체적인 기본구상(안)을 마련하여 도시건설위원회에 보고 하겠음
제398회 임시회 주요업무계획 보고	최용철	◦ 에코시티 조성사업이 ’24년 3월 완료되는데 사업비 정산시 검증 방법이 있는지?	◦ 매분기 마다CM(건설사업 관리단)에서 기성검사를 실시하고, 매년 마다 회계 감사를 통해 투자비용을 검증하고 있으며, 사업완료시 최종적으로 총사업비를 확정 하여 사업비 정산에 철저를 기하겠음
제398회 임시회 주요업무계획 보고	박선전	◦ 전주교도소 추진상황은 ? ◦ 보고 계획대로 내년까지 공사 준비가 될 수 있는지?	◦’23년 10월 기준 전주교도소 이전부지 보상률 72%정도임 ◦ 토지소유자와 지속 협의 노력중이며, 협의가 어려운 토지는 향후 토지수용 검토예정 ◦ 법무부에서 실시계획인가 절차 완료 후 수용절차 이행 계획
제398회 임시회 주요업무계획 보고	박선전	◦ 전주역세권 복합개발사업 진행상황은? ◦ 해당 지역의 개발추진위, 상가협의회 등의 의견은 어떤지?	◦ 사업시행자인 LH와 교통개선대책(안) 및 토지이용계획 등 사업 계획 지속 협의 중 ◦ 장재마을, 개발추진위에서는 원안대로 신속한 사업추진을 원하고 있음
제398회 임시회 주요업무계획 보고	김원주	◦ 전주역세권 복합개발사업 진행상황에 변한게 있는지? ◦ 부동산 문제 관련하여 언론보도 등이 나오고 있으며, 대규모 개발에 대해서는 우려가 있음	◦ 사업시행자인 LH와 교통개선대책(안) 및 토지이용계획 등 사업 계획 지속 협의 중
제399회 임시회 시정질문	이남숙	◦ 전주교도소 이전부지 토지 보상절차 진행상황 및 사업진척도 향상 방안? ◦ 이주단지 부지 보상 협의 계획 및 주민들 이주계획? ◦ 현 교도소 부지 활용 계획 및 예산 확보 방안?	◦ ’23년 10월 기준 전주교도소 이전부지 보상률 72%정도임 ◦ 토지소유자와 지속 협의 노력중이며, 협의가 어려운 토지는 향후 토지수용 검토예정 ◦ 이주단지 총 사업비 변경 협의(기재부) 중으로, 협의 완료(’23.11월 말) 후 보상계획 공고 등 절차 이행 계획 ◦ 현 교도소 부지는 전주교도소 착공 시점에 맞춰 활용방안 검토 계획
제400회 임시회 5분발언	최명권	◦ 송천동 지역주민들의 요구사항을 적극 수렴하여 천마지구 도시개발사업 행정절차를 신속하게 추진할 것을 촉구	◦ 전주대대 이전사업 보상계획 공고(’23.8.) 및 보상협의회 구성·운영(’23.10.)하여 행정절차를 진행 중이며, 전주대대 이전사업 일정을 고려하여 천마지구 도시개발사업 행정절차(실시계획 및 환지계획) 추진 예정
제403회 임시회 주요업무 추진상황 보고	양영환	◦ 전주교도소 추진 상황이 어떻게 되는지?	◦ ’23년 10월 기준 전주교도소 이전부지 보상률 72%정도임 ◦ 토지소유자와 지속 협의 노력중이며, 협의가 어려운 토지는 향후 토지수용 검토예정 ◦ 법무부에서 실시계획인가 절차 완료 후 수용절차 이행 계획
제403회 임시회 주요업무 추진상황 보고	최용철	◦ 에코시티 체비지 40필지 매각은 무슨 내용인지? ◦ 주차장 용지 등 체비지 매각 전 의회 보고를 통해 매각 필요성 검토 바람	◦ 체비지는 「○○부대 이전 및 부지개발사업」에 투입된 사업비 충당을 위한 재원으로, 원활한 매각을 위해 부동산 경기를 조망하면서 ‘23.5월부터 6월까지 2차례에 걸쳐 189필지 중 40필지를 매각함 ◦ 체비지의 처분에 관한 사항은 일반적인 공유재산과는 달리 「도시개발법」에 규정되어 있으며, 의회의 동의나 보고사항이 아님
제403회 임시회 주요업무 추진상황 보고	이 국	◦ 에코시티 개발시 도로가 좁아 버스가 한번에 회전을 못하는 문제가 있어 이에 대한 검토가 필요하고, 천마지구 개발시 충분한 도로폭 확보 필요	◦ 확정된 개발계획에 따라 공사가 마무리 단계에 있어, 도로확장은 어려운 여건으로, 운영상 문제점 발생시 교통체계 개선 등의 해결방안을 모색하겠으며 향후 추진 예정인 천마지구 개발계획(변경) 수립시 적정한 도로 폭이 확보될 수 있도록 검토하겠음

자료번호 : 1              작성자 : 도시정비과장 허갑수  (인)

자 료 명 : 의회의 시정, 건의요구사항 처리결과

구 분	시정, 건의사항		처리사항	미처리 사유
	의 원	내 용
제397회 제2차 정례회 행정사무감사	박선전	◦ 서학동 도시재생사업 창작레지던시,행복플러 스센터,복합문화시설의 사후관리 및 추진상황	◦ 거점시설 시범운영 역량강화 프로그램 및 주민간담회 추진
제397회 제2차 정례회 행정사무감사	이 국	◦ 덕진권역 뉴딜사업 추진상황 및 전북대 캠퍼스 혁신파크 협의 내용은?	◦ 도시재생활성화계획 변경 (부지재생→MICE산업 거점조성) 수립 용역 추진 중 ◦ 종합경기장 부지를 활용하여 거점시설 조성으로 계획 변경 추진
제397회 제2차 정례회 행정사무감사	김성규	◦ 서학예술 마을 골목길은 왜 획일적이며 행복플러 스센터에 예술인이 들어 가길 원하는데, 왜 못 들어가게 하는지?	◦국토부에서 하나의 협동조합으로 설립해야 한다는 의견이며, ◦주민간 갈등으로 협동조합 설립이 지연되서 현재 간담회 등 해결을 위해 노력 중임
제397회 제2차 정례회 행정사무감사	양영환	◦ 역세권 명품복합 환승장의 목적은 무엇인지?	◦ 도시재생 활성화 계획상 열차 외 지역 내·외간 대중교통 연계를 위한 환승시설과 관광객을 위한 편의시설 및 관광시설을 포함한 통합플랫폼을 조성할 계획임
제397회 제2차 정례회 행정사무감사	최명철	◦ 도시재생관련 추후 공모 계획이 있는지?	◦ ’23년 상반기 중 공모 2개소 (우리동네살리기, 혁신지구) 대응 추진 - 공모결과 : 미선정
제397회 제2차 정례회 행정사무감사	최용철	◦ 도시재생 공모사업 추진 상황과 내부계획은 무엇 인지?	◦ ’23년 상반기 중 공모 2개소 (우리동네살리기, 혁신지구) 대응 추진 - 공모결과 : 미선정
제397회 제2차 정례회 행정사무감사	최용철	◦ 도시재생 거점시설 운영 방안과 운영관리계획 수립 필요	◦ 도시재생 거점시설 운영관리 계획(안) 수립 및 도건위 사전간담회 추진 완료(’23.10.)
제397회 제2차 정례회 행정사무감사	최용철	◦ 신복1길 정비사업에서 불법 시설물 정비에 대한 추진상황 ◦ 팔복동 주민센터 증액 사유 무엇인지?	◦ 일부 불법시설물 정비 완료 ◦ 개략 공사비 대비 실공사금액 산출에 따른 사업비 증가
제397회 제2차 정례회 행정사무감사	최용철	◦ 전선로 지중화공사 집행률이 저조한 이유?	◦ 지중화사업 선정 통보(한전→ 전주시) 및 설계 완료 지연(’23. 10.) - 지중화사업 선정: ’23. 1. - 한전·통신 지중화 협약: ’23. 2.∼4. - 설계완료 및 분담금 납부: ∼’23. 10.
제398회 임시회 주요업무계획 보고	이 국	◦ 덕진권역 도시재생사업 진행여부와 그동안 사업 계획은 어떻게 되는지?	◦ 도시재생활성화계획 변경 (부지재생→MICE산업 거점조성) 수립 용역 추진 중 ◦ 노후등기구 교체, 보행안전 조명 등 정비사업 추진 중
제398회 임시회 주요업무계획 보고	천서영	◦ 금암고일원 도시재생사업 사업개요 및 현재 추진된 협의내용은?	◦ 공모 대응 시 주민공동이용시설 건립, 공원조성, 노후주택 및 골목길 정비 등의 사업계획 수립 으로 공모대응 하였으나, ◦ 시유지 미확보(금암고 부지)에 따른 부지점수 부족으로 미선정
제398회 임시회 주요업무계획 보고	이 국	◦ 도시재생 거점공간 관리 부서나 운영 주체를 명확 히하여 지속적인 운영 및 관리하여 주기 바람	◦ 도시재생 거점시설 운영관리 계획(안) 수립 및 도시건설위원회 사전간담회 추진 완료(’23.10.)
제398회 임시회 주요업무계획 보고	최용철	◦ 아중호수 수변탐방로 조성사업 개인토지 협의 진행여부와 주차장 확보계획	◦ 아중호수 개인 토지주와 협의 완료하여 아중호수 수변 탐방로 조성사업 추진 중에 있음 ◦ 아중호수 관광 명소화 사업과 연계하여 추진하도록 하겠음
제398회 임시회 주요업무계획 보고	최용철	◦ 스마트그린도시 조성 사업이 22년도에 완료 되지 못하고 지연된 사유는?	◦ 주민의견 수렴 등 행정절차이행에 따라 사업 지연되었으며, ◦ 현재 정상 공사추진중(공정률 80%)으로 ’23년도 내 사업 완료 계획임
제398회 임시회 주요업무계획 보고	박선전	◦구도심에 정비되지 않는 빈집이 계속 증가하고 있는데 개인소유 빈집을 강제로 철거하는 방안을 마련할 수 있는지?	◦ 빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법 제정으로 직권 철거에 대한 법 조항이 생겼 으며, 철거명령을 위해서는 조례제정이 필요함 ◦ 빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법 조례 제정 추진중
제398회 임시회 주요업무계획 보고	박선전	◦ 도시재생 거점공간 관리계획을 수립하여 주기 바람	◦ 도시재생 거점시설 운영관리 계획(안) 수립 및 도시건설위원회 사전간담회 추진 완료(’23.10.)
제403회 임시회 주요업무 추진상황보고	양영환	◦ 서학예술마을사업 중 현재 미운영되는 거점 시설은 운영비 지원 없이 자체 운영방안을 마련하여 주민이 활용 할수 있도록 계획수립이 필요함	◦ 거점시설 운영을 위한 역량강화 프로그램 추진 중이며, 자체 운영할 수 있도록 계획수립 하여 검토하겠음
제403회 임시회 주요업무 추진상황보고	천서영	◦ 금암고 일원 도시재생 (우리동네살리기) 공모 사업 내용 및 추진상황	◦ 공모 대응 시 주민공동이용시설 건립, 공원조성, 노후주택 및 골목길 정비 등의 사업계획 수립으로 공모대응 하였으나, ◦ 시유지 미확보(금암고 부지)에 따른 부지점수 부족으로 미선정
제403회 임시회 주요업무 추진상황보고	이 국	◦ 덕진권역 뉴딜사업 관련 전북대 캠퍼스 혁신파크 업무 협의 내용은?	◦ 도시재생활성화계획 변경 (부지재생→MICE산업 거점조성) 수립 용역 추진 중 ◦ 종합경기장 부지를 활용하여 거점시설 조성으로 계획 변경 추진 중 이며, 의회 사전 협의 후 진행하겠음
제404회 임시회 5분발언	박선전	◦ 옛 금암고 일원 도시재생 전주시 직접 추진	◦ ’23년 상반기 중 공모 대응 추진 - 공모결과 : 미선정(부지점수 부족) ◦ 금암고 부지매입 후 정비방안 재검토

자료번호 : 3         작성자 : 종합경기장개발과장 김용삼 (인)

자 료 명 : 이월사업 현황

○ 명시이월 사업

(단위 : 천원)

추진부서	사업명	사업량	예산액	이월액	이월사유	추진실적
종합경기장 개발과	종합경기장 부지개발 야구장 철거	야구장 철거 5,571㎡	1,700,000	1,696,040	준공기한 미도래에 따른 이월	사업완료
종합경기장 개발과	도시계획변경 사전협상 자문단 운영	자문회의 13회	20,000	20,000	도시계획변경 사전협상 운영지침이 수립중에 있어 예산집행 시기 미도래로 이월	도시계획변경 사전협상 운영 지침이 9월말 제정되어 협상조정협의회 구성 및 협상대상지 선정등의 행정절차를 이행하여야하므로 연내 예산집행이 어려움

○ 계속비이월 사업                                       (단위 : 천원)

추진부서	사업명	사업량	예산액	이월액	이월사유	추진실적
종합경기장 개발과	전주 육상경기장 및 야구장 건립	․1종 육상경기장 1식 ․야구장 1식	5,057,657	2,121,828	장기계속 공사 사업	건립공사 착공 (’23. 6.)

자료번호 :  3         작성자 : 재개발재건축과장  국승철 (인)

자 료 명 : 이월사업 현황

○ 명시이월 사업

(단위 : 천원)

추진부서	사업명	사업량	예산액	이월액	이월사유	추진실적
재 개 발 재건축과	노후 공동주택 관리지원	공동주택 119개 단지	2,383,014	81,665	사업자선정 지연 및 동절기 공사중지	사업완료

자료번호 : 3               작성자 : 도시개발과장 장재영 (인)

자 료 명 : 이월사업 현황

○ 명시이월 사업

(단위 : 천원)

추진부서	사업명	사업량	예산액	이월액	이월사유	추진실적
도시개발과	전주교도소 이전사업보상	194천㎡	33,411,543	19,938,377	이전 부지 보상협의 미완료	보상률 (72.6%)

○ 사고이월 사업

(단위 : 천원)

추진부서	사업명	사업량	예산액	이월액	이월사유	추진실적
도시개발과	만성지구 ∼기지제간 생태육교 설치	-생태육교 설치 L=33m, B=5m, 경사로 223m -전기시설 등	800,000	90,175	행정절차 진행 및 예산(도비)확보 상황에 따른 미준공	-실시설계용역 ․착수(’22.4.29.) ․중지(’22.9.20.) -전기공사실시설계용역 ․착수(’22.12.26.) ․중지(’23.2.14.)
도시개발과	공공청사 이전사업	-도시관리계획 결정(변경)1식 -재해영향성 검토 1식	191,908	108,111	관계기관 협의 (농지전용 등) 기간 소요	-도시관리계획(용도지역,공공청사)결정(변경)용역 ․완료(’23.8.3.) -재해영향성검토용역 ․완료(’23.7.26.)
도시개발과	에코시티 서측 연계도로 도시계획시설(도로) 결정 용역	-도시계획도로 시설결정 L=1,265m, B=10m -재해영향성검토 1식	78,000	73,814	관계기관(부서) 협의 및 최적(안) 검토에 장기간 소요	-도시계획시설(도로)결정용역 ․착수(’21.3.4.) ․중지(’21.10.26.) ․공정율 85% -재해영향성검토용역 ․착수(’22.7.18.) ․중지(’22.9.16.)

○ 계속비이월 사업

(단위 : 천원)

추진부서	사업명	사업량	예산액	이월액	이월사유	추진실적
도시개발과	효천지구 연계도로 확장공사	도로확장 L=3.4km, B=20∼25m	7,043,157	1,629,235	토지보상협의 (수용재결)중	1단계 구간 (L=1.9km, B=20∼25m)준공(’22.12.)

자료번호 : 3               작성자 : 도시정비과장 허갑수 (인)

자 료 명 : 이월사업 현황

○ 명시이월 사업

(단위 : 천원)

추진부서	사업명	사업량	예산액	이월액	이월사유	추진실적
도시정비과	도시재생 활성화계획 수립	․도시재생 전략계획 및 활성화계획 수립	320,732	70,000	’23년 도시재생 공모사업 대응 예산 이월	·도시재생사업 (우리동네살리기) 실행계획 수립 용역 완료(’23. 9.)
도시정비과	서학동 예술마을 도시재생 뉴딜사업	·근린생활가로 정비사업 ·주민역량강화, 공동체 활동 및 사회적 경제조직 활성화	4,819,934	465,160	준공기한 미도래 (’18∼’23년)	·거점시설 시범운영 역량강화 프로그램 추진(‘23.5.～12.) ·근린생활가로(간판 정비)사업 완료 (’23. 9.)
도시정비과	도토리골 새뜰마을 조성사업	․노후주택 개선 ․생활인프라 개선 ․공동체 활성화	1,844,200	637,255	철근 수급 지연으로 인하여 거점공간(가칭 커뮤니티센터) 조성 지연	·건축공사 추진(`22. 6월) (공정율70%) ·절개지 사면안정화 및 보강공사 완료 (’23. 6.)
도시정비과	남노송동 새뜰마을 조성사업	․노후주택 개선 ․생활인프라 개선 ․공동체 활성화	1,588,394	763,153	주민공동이용시설 주민협의 지연으로 인해 공사 일정 지연	·골목길 정비 공사 완료 (’23. 8.) ·지붕개량공사 완료 (’23. 10.)
도시정비과	동완산동 새뜰마을 조성사업	․노후주택 개선 ․생활인프라 개선 ․공동체 활성화	1,524,900	839,799	마스터플랜 국토부 승인 지연에 따른 사업 추진 지연	․마스터플랜 승인 (’22. 10.) ․재해예방공사 완료 (’22. 11.) ․인프라 개선공사 완료 (’23. 11.) ․집수리 및 지붕 개량 완료(’23. 11.)
도시정비과	특화거리, 광장 유지관리	․특화거리 13개소, 특정광장 9개소	343,000	41,595	준공기한 미도래	․준공(’23. 6.)
도시정비과	아중호수 수변탐방로 조성사업	․수변탐방로 조성 L=320m	500,000	500,000	2회 추경예산 편성으로 예산집행 공기 부족	․행정절차 이행 (’23. 5.) ․공사 착수(’23. 6.) (공정율30%)
도시정비과	전주 서학광장 경관시설 설치사업	․경관시설(퍼걸러) 설치 1식	20,000	20,000	3회 추경예산 편성으로 예산집행 공기 부족	․실시설계 추진 (’23. 3.～10.)
도시정비과	범죄예방 환경개선사업	․범죄예방시설 설치 ․교통안전시설 확충 ․산책로 정비 등	300,000	300,000	3회 추경예산 편성으로 예산집행 공기 부족	․공모선정(’22. 10.) ․설계용역추진 (’23. 1.～6.) ․공사착수(’23. 7.) ․교통안전시설(토목) 완료(’23. 9.) ․교통시설물,가로등, CCTV등 설치(’23. 10.)
도시정비과	서학광장 바닥분수 조성사업	․경관시설(바닥분수, 퍼걸러) 설치 1식	400,000	400,000	3회 추경예산 편성으로 예산 집행 공기 부족	․실시설계 완료 (’23. 3.～10.)
도시정비과	도시재생 인정사업 서로돌봄 플랫폼 조성사업	·지상4층 신축 연면적 650.08㎡ 건축면적 167.08㎡	3,120,259	2,545,254	준공기한 미도래	·공사추진 중 (’22. 10.∼’23. 11.) (공정률 85%)
도시정비과	인후·반촌 도시재생 뉴딜사업	·대지면적 91,165㎡ ·집수리 지원사업 ·안심골목 정원화 사업 ·마을공동공간 조성공사	1,826,446	775,975	준공기한 미도래 (’21∼’24년)	·집수리지원사업 1차(38가구) 준공 (’23.3.) ·마을공동공간 조성 준공(’23.10.) ·안심골목 정원화 사업(2차분) 추진
도시정비과	스마트 그린도시 조성사업	·스마트 그린도시 조성 1식	15,370,876	9,653,270	준공기한 미도래	·스마트쉘터(4개소), 공공주차장(1개소) 조성완료 ·쿨링앤클린로드 조성 (공정률 95%) ·물순환청정길조성 (공정률 90%) ·신복1길 정비 (공정률 80%)
도시정비과	팔복동 빈집밀집구역 도시재생사업	․빈집밀집구역 정비 (100,000㎡)	3,591,039	1,097,656	거점시설 부지매입 지연 및 설계 용역 미완료	·활성화계획 변경(2차) 완료(’23.7.) ·수다가든 4개소 조성 완료(’23.7.) ·골목쉼터 2개소 조성 완료(’23.7.) ·빈집 철거(4차)공사 완료(’23.8.) ·지중화공사 추진 (’23.8.∼)
도시정비과	저층주거지 골목길 정비사업	·노후저층주거지 2개소 (완산구 1, 덕진구 1)	1,209,382	775,540	『전주시 저층주거지 골목길 정비 및 집수리 조례』제정에 따른 골목길 정비 사업지 선정으로 인한 사업 추진 지연	·덕진구 저층주거지 골목길 정비사업 준공(’23.4.) ·완산구 저층주거지 골목길 정비사업 준공(’23.6.)
도시정비과	마을주도 탄소중립 실천확산 지원사업	·탄소중립 거점 조성, ·투명페트병 무인회수기 2대 설치	200,000	200,000	거점 대상지 선정 및 사전협의기간 소요	·거점 대상지 검토 및 선정(∼’23.6.) ·거점사전협의 및 실시 설계 추진(’23.6.∼) ·무인회수기 제조 설치 발주(’23.9.∼)

○ 사고이월 사업

(단위 : 천원)

추진부서	사업명	사업량	예산액	이월액	이월사유	추진실적
도시정비과	도시재생 활성화계획 수립	․도시재생 전략계획 및 활성화계획 수립	320,732	97,434	준공기한 미도래	·서학동 활성화계획 변경 용역(’23.10. 준공 완료) ·전주시 전략계획 변경 용역(’23.12. 준공 예정) ·역세권 활성화계획 변경 용역(’23.12. 준공 예정)
도시정비과	서학동 예술마을 도시재생 뉴딜사업	․집수리(3차)석면철거공사	4,819,934	4,630	준공기한 미도래	·집수리(3차)석면철거 공사 준공(‘23. 1.)
도시정비과	용머리 여의주마을 도시재생 뉴딜사업	․서완산동1가 57일원 (49,163㎡)	2,629,677	36,460	토지수용으로 인한 토지보상비	·토지수용 절차 추진(’23.2.∼9.) ·토지수용재결 신청(‘23.10.)
도시 정비과	도토리골 새뜰마을 조성사업	․노후주택 개선 ․생활인프라 개선 ․공동체 활성화	1,844,200	301,498	철근 수급지연으로 인하여 거점공간(가칭 커뮤니티센터) 조성 지연	·건축공사 추진(’22. 6.) (공정율 70%) ·절개지 사면안정화 및 보강공사 완료 (’23. 6.)
도시 정비과	남노송동 새뜰마을 조성사업	․노후주택 개선 ․생활인프라 개선 ․공동체 활성화	1,588,394	1,770	사업 준공기간 미도래(`24.12)에 따른 시설부대비 이월	·집행 완료
도시 정비과	첫마중길 활성화 사업	․첫마중길 빛의거리 조성	416,128	119,330	선행공정(조경) 미도래에 따른 공사 추진 불가	·공사 추진 (’21.12.∼’23.10.)
도시정비과	도시재생 인정사업 서로돌봄 플랫폼 조성사업	·지상4층 신축 연면적 650.08㎡ 건축면적 167.08㎡	3,120,259	260,528	준공기한 미도래	·공사추진 중 (’22.10.∼’23.11.) (공정률 85%)
도시정비과	인후반촌 도시재생 뉴딜사업 도시계획시설 (도로) 결정 용역	․도시계획시설(도로) 결정 용역 1식	60,000	25,464	행정절차 이행 (도시계획위원회 심의 등)	·행정절차 이행 (∼’23.2.) ·도시계획시설(도로) 결정 용역 완료 (’23.2.)
도시정비과	스마트 그린도시 조성사업	·스마트 그린도시 조성 1식	15,370,876	1,734,801	준공기한 미도래	·스마트쉘터(4개소), 공공주차장(1개소) 조성완료 ·쿨링앤클린로드조성 (공정률 95%) ·물순환청정길조성 (공정률 90%) ·신복1길 정비 (공정률 80%)
도시정비과	저층주거지 골목길 정비사업	․노후저층주거지 2개소 (완산구 1, 덕진구 1)	1,209,382	90,000	『전주시 저층주거지 골목길 정비 및 집수리 조례』제정에 따른 골목길 정비 사업지 선정으로 인한 사업 추진 지연	·덕진구 저층주거지 골목길 정비사업 준공(’23.4.) ·완산구 저층주거지 골목길 정비사업 준공(’23.6.)

○ 계속비이월 사업

(단위 : 천원)

추진부서	사업명	사업량	예산액	이월액	이월사유	추진실적
도시정비과	전주역세권 도시재생 뉴딜사업	·10개 마중물사업	4,921,763	3,072,128	준공기한 미도래	·주민역량강화 사업 추진 (’23.1.∼12.) ·거점시설 리모델링 공사 준공(’23.4.) ·단위사업별 공사 추진(’22.11.∼)
도시정비과	덕진권역 도시재생 뉴딜사업	․메타버스 아이디어 플랫폼 및 사업화 실증단지 조성 등	1,400,000	1,400,000	’27년종료 사업으로 ’22년 11월 교부받은 국도비 이월	·스마트거리 조성 사업(led등기구교체 등)추진 및 도시 재생활성화계획 변경 수립 용역 추진 중

자료번호 : 4         작성자 : 종합경기장개발과장 김용삼 (인)

자 료 명 : 투융자심사사업 추진현황

(단위 : 백만원)

심사 사업		추진 사업		미추진 사업			비 고
건수	금액	건수	금액	건수	금액	사유
1	11,000	1	11,000				전주종합경기장 철거

자료번호 : 4              작성자 : 도시정비과장 허갑수 (인)

자 료 명 : 투융자심사사업 추진현황

(단위:백만원)

심사 사업		추진 사업		미추진 사업			비고
건수	금액	건수	금액	건수	금액	사유
1	4,920	1	4,920				노후시설물 정비를 통한 생활 SOC 확충사업

자료번호 :  8          작성자 : 재개발재건축과장  국승철 (인)

자 료 명 : 기금적립 및 운용 현황

(단위 : 천원)

기금명	설치일자	목 적	적립기간	기 금 액			소 관 부 서
				목표액	조성액	지출액
전주시 도시·주거 환경정비기금	’13.1.1.	주거환경 불량지역의 계획적 정비 및 노후불량 건축물 개량 등 정비사업의 원활한 추진 지원	2013년∼		3,272,849	126,284	재 개 발 재건축과

※ 도시·주거환경정비기금 집행내역

(단위 : 천원)

구 분	사 업 내 용	사 업 비	비고
계		126,284
사무관리비	개나리아파트 재건축 안전진단 적정성 검토 수수료	80,284
연구용역비	2030 전주시 도시주거환경정비 기본계획수립에 따른 약식 전략환경영향평가 용역	46,000

자료번호 : 8               작성자 : 도시개발과장 장재영 (인)

자 료 명 : 기금적립 및 운용현황

(단위 : 천원)

기금명	설치일자	목 적	적립기간	기 금 액			소관 부서
				목표액	조성액	지출액
전주시 부대이전 및 부지개발 사업기금	’06.5.15.	전주시 부대이전 및 부지개발사업에 대한 민간자본의 유치 및 시행에 따라 집행하는 보상비 등의 효율적 관리	’22.11. ~ ’23.10.		29,835,918	29,535,683	도시 개발과

※ 부대이전 및 부지개발사업기금 집행내역

(단위 : 천원)

세부사업	사 업 내 용	사 업 비	비고
계		29,535,683
부대이전사업	항공대대 인접마을 토지 및 지장물 보상, 재산권변동을 위한 수수료 등	710,851
부지개발사업	토지(지장물) 보상, 부담금(통신시설 이설), 감리비, 재산권변동을 위한 수수료 등	1,264,200
전주대대 이전사업	소송수행비, 재산권변동을 위한 수수료 등	184,714
분양대금 상환	체비지 매각대금(계약금,중도금,잔금) 양여재산 매각대금 상환 등	27,375,918

자료번호 :  9         작성자 : 재개발재건축과장  국승철 (인)

자 료 명 : 집단민원 처리상황(20인 이상)

접수일	건 명	민원 인수	처리 기한	처리일	처 리 결 과
					해 결	미해결	처리중
’23.2.3.	전주시 도시계획조례 변경 요청(용적률 상향) 및 도시·주거환경정비 기본계획 수립시 법적 최고 용적률 적용 및 층수 제한 해지 요청	40	’23.2.13.	’23.2.10.			○
’23.4.4.	기자촌구역 철거공사 관련하여 명약국 앞 도로 소음, 매연, 도로꺼짐 등 불편사항 해결 요청	109	’23.4.12.	’23.4.7.	○
’23.7.26. ’23.8.17. ’23.9.15. (반복민원)	개나리아파트 정비사업 조합설립추진위원회 구성 동의서 징구시 검인 신청에 대한 기준 마련 요청	21	’23.8.3. ’23.8.24. ’23.9.25.	’23.8.2. ’23.8.24. ’23.9.15.	○
’23.8.23.	감나무골 재개발정비사업 관리처분계획의 주택공급 사항 검토 요청	24	’23.8.31.	’23.8.31.			○

자료번호 : 9               작성자 : 도시개발과장 장재영 (인)

자 료 명 : 집단민원 처리상황(20인 이상)

접수일	건 명	민원 인수	처리 기한	처리일	처 리 결 과
					해 결	미해결	처리중
’23. 2. 1.	전주교도소 이전사업에 따른 전주시장 면담신청	24	’23. 2. 9.	’23. 2. 8.	○

자료번호 : 10        작성자 : 종합경기장개발과장 김용삼 (인)

자 료 명 : 소송업무 수행현황

사건명	소송당사자	사건개요	소송진행상황(승패)			비 고
			1심	2심	3심
건물인도	· 원고 : 전주시장 · 피고 : 황대운	사업부지 내 편입지장물의 임차인이 영업 보상 완료 후 이전기한이 도래함에도 이전하지 않아 임차인을 상대로 민사소송(명도소송) 진행	원고승소 (’22.5.24)	원고승소 피고 항소취하 (’23.2.8.)		종결

자료번호 :  10        작성자 : 재개발재건축과장  국승철 (인)

자 료 명 : 소송업무 수행현황

사건명	소송당사자	사건개요	소송진행상황(승패)			비고
			1심	2심	3심
정비구역 해제	·원고 : 이창희외 1 ·피고 : 전주시장	2011.10.6. 피고가 결정·고시한 효자주공주택재건축정비사업 정비구역의 해제 청구	청구기각 (’21.7.15.) 피고 승	청구기각 (’22.11.16.) 피고 승	상고접수 (’22.12.15.) 상고기각 (’23.3.30.) 피고 승	종결
조합설립 변경신고 수리처분 취소	·원고 : 김진구외 12 ·피고 : 전주시장	2021.9.28. 피고가 처분한 효자주공 재건축정비사업 조합설립 변경신고 수리 처분에 대한 취소	청구기각 (’23.10.19.) 피고 승			종결
집행정지	·원고 : 김진구외 12 ·피고 : 전주시장	2021구합2701‘정비계획 변경결정 취소사건’의 판결 확정시까지 2021.7.26. 피고가 처분한 정비계획변경 고시의 효력을 정지신청	소장접수 (’23.2.11.) 청구기각 (’23.3.22.) 피고 승	항고기각 (’23.6.5.) 피고 승		종결
정비구역 변경결정 취소	·원고 : 김진구외 12 ·피고 : 전주시장	2021.7.26. 피고가 처분한 효자주공 재건축정비사업 정비계획 변경결정에 대한 취소	청구기각 (’23.4.13.) 피고 승	항소접수 (’23.4.20.)		진행중
조합설립 인가처분 무효확인	·원고 : 재단법인 씨알외 13 ·피고 : 전주시장	2013.5.6. 피고가 처분한 효자주공 주택재건축정비 사업 조합설립인가 처분에 대한 무효 확인	소장접수 (’23.2.24.)			진행중
수용재결 취소 등	·원고 : 김의수외 8 ·피고 : 전주시장외 2	동양아파트인근구역 재개발정비사업과 관련, 피고 전주시장이 처분한 조합설립인가, 사업시행계획인가 처분 무효, 피고 전라북도지방토지수용위원회가 원고들에게 한 수용재결 취소	소장접수 (’23.6.26.)			진행중
손해배상 (기)	·원고 : 다가동지역 주택조합 ·피고 : 전주시장	완산구 다가동2가 116-1번지 일원에 다가동지역주택조합이 신청한 주택건설사업계획승인신청이 반려된 후 조합에서 전주시를 상대로 7억원의 손해배상 청구	청구기각 (’21.9.15.) 피고 승	청구기각 (’22.12.22.) 피고 승	-	종결
학교용지 부담금 부과처분 취소	·원고 : 아시아신탁 주식회사 ·피고 :전주시장	신규 주택이 공급되는 개발사업분만을 기준으로 학교용지부담금의 부과대상을 정하여야 하나, 사업으로 증가된 세대수에 해당하는 부분이 아닌 모든 세대수에 해당하는 부분에 대하여 학교용지 부담금을 부과한 처분은 위법하므로 부과처분 취소 청구	위헌법률 심판제청결정 (’20.12.16.)			진행중

자료번호 : 10               작성자 : 도시개발과장 장재영 (인)

자 료 명 : 소송업무 수행현황

사건명	소송당사자	사건개요	소송진행상황(승패)			비고
			1심	2심	3심
소유권말소등기	·원고 : 장형도 외 23 ·피고 : 전주시 외 1	종전 35사단 부지내 토지에 대한 소유권 주장, 국방부에 징발되기 전까지 토지를 소유하였으며 이후 전주00부대 이전부지 도시개발 사업으로 인하여 토지가 폐쇄됨	소장접수 (’20.6.30.) 청구각하 (’23.4.24.) 피고 승	항소접수 (’23.5.26.)		진행중
국방 군사시설 사업실시계획 승인처분 무효확인 등	·원고 : (1심) 박정철 외 4 (2심) 윤석일 외 2 ·피고 : 국방부 -전주시(보조참가)	사업계획의 조건부의 조건 해소 없이 승인된 사업계획에 대한 무효 및 집행정지	소장접수 (’22.7.28.) 청구기각 (’23.5.11.) 피고 승	항소접수 (’23.5.26.)		진행중
손해배상청구	·원고 : 이희자 ·피고 : 전주시, 국방부	도도동 항공대대 헬기 소음으로 축사 및 정신적 피해 등 손해배상	소장접수 (’19.9.4.) 변론기일 준비중			진행중

자료번호 : 11         작성자 : 재개발재건축과장  국승철 (인)

자 료 명 : 행정심판 청구내역

사건명	청구인	청구취지	처리결과	관리부서	비 고
사업시행계획인가 고시 취소 등 청구	김진구외13	효자주공주택재건축정비사업조합의 사업계획인가 고시(2023.7.7.)에 대한 행정심판 청구	행정심판 접수 (’23.9.27.) 답변서 제출 (’23.10.11.)	재 개 발 재건축과	진행중
주택건설사업계획승인 취소 처분 취소 등 청구	기린로 지역주택 조합	전주시장이 2022년 12월 9일 청구인에게 한 기린로지역주택조합 주택건설사업계획승인 취소처분에 대한 취소 청구	기각 (’23.5.19.)	재 개 발 재건축과	종결

자료번호 : 12               작성자 : 도시개발과장 장재영 (인)

자 료 명 : 수의계약 체결현황

○ 일반공사(도급액 1천만원 이상)

(단위 : 천원)

공사명	계약일	설계금액	계약금액	사유	상호(대표)	비고
효천지구 연계도로 1단계 확장사업 과속방지턱 설치공사	’23. 9. 18.	21,689	19,520	지방계약법 시행령 제25조	유한회사 대윤건설 (이윤성)	완료

자료번호 : 12              작성자 : 도시정비과장 허갑수 (인)

자 료 명 : 수의계약 체결현황

○ 일반공사(도급액 1천만원 이상)

(단위 : 천원)

공사명	계약일	설계금액	계약금액	사유	상호(대표)	비고
도시재생 인정사업 별과함께, 다가서당 프로젝트 담장 설치공사	’22.12.05.	18,326	16,493	지방계약법 시행령 제25조 의거 (소액수의)	(유)바산건설 (안병호)
"별과함께, 다가서당 프로젝트" 편의시설 설치 공사	’22.12.19.	18,766	16,889	지방계약법 시행령 제25조 의거 (소액수의)	㈜디자인버튼 (정봉건)
용머리 여의주마을 공동텃밭 조성사업	’22.11.15.	20,691	18,622	지방계약법 시행령 제25조 의거 (소액수의)	㈜지오 (이성임)
용머리 여의주마을 옛이야기 도서관 화장실 조성공사	’22.11.18.	14,168	12,751	지방계약법 시행령 제25조 의거 (소액수의)	대천ENG (이진영)
용머리 여의주마을 온실 기초 설치 및 부대공사	’22.12.08.	14,839	13,355	지방계약법 시행령 제25조 의거 (소액수의)	유희하우징 (강철희)
노후LED 등기구 교체공사	’23.09.18.	11,363	10,266	지방계약법 시행령 제25조 의거 (소액수의)	세인건설(유) (이상연)
전북대학교 구정문 앞 LED바닥 신호등 설치공사	’23.09.18.	11,891	10,701	지방계약법 시행령 제25조 의거 (소액수의)	㈜건국 (이재수)
스마트그린도시 신복로 공영주차장 조성사업(통신)	‘23.03.15.	14,112	12,701	지방계약법 시행령 제25조 의거 (소액수의)	제이에스엔(주) (김전수)
스마트그린도시 물순환청정길 조성사업 (스마트폴)(전기)	’22.11.08	12,364	11,127	지방계약법 시행령 제25조 의거 (소액수의)	(유)광신사 (박종호)
스마트그린도시 쓰레기 배출시설 가옥철거공사	‘23.05.15.	19,451	17,505	지방계약법 시행령 제25조 의거 (소액수의)	홍진환경건설(주) (소재홍)
스마트그린도시 CCTV광케이블 설치공사	’23.06.13.	22,000	19,800	지방계약법 시행령 제25조 의거 (소액수의)	㈜이에스테크 (박형재)
스마트그린도시 비상소화장치 철거 및 설치공사	’23.10.17.	18.931	17,037	지방계약법 시행령 제25조 의거 (소액수의)	㈜신화방재 (김기흥)
2022년 남노송동 새뜰마을 조성사업 공폐가철거공사 석면폐기물 해체제거공사	`22.11.02.	14,663	12,575	지방계약법 시행령 제25조 의거 (소액수의)	홍진환경건설 주식회사 (소재홍)
2022년 동절기 특화거리 및 광장 조경시설물 유지보수공사 (단가계약)	`22.12.13	14,800	13,320	지방계약법 시행령 제25조 의거 (소액수의)	㈜그린조경 (강향숙)
도토리골 절개지 사면안정화 및 보강공사 실시설계용역	`22.12.08.	13,546	12,191	지방계약법 시행령 제25조 의거 (소액수의)	㈜건설품질 시험원 (이재열)
2023년 특화거리 및 광장 전기시설물 유지보수공사 (단가계약)	`23.01.20.	22,000	19,800	지방계약법 시행령 제25조 의거 (소액수의)	(유)신아전기 (정영진)
오거리광장 하수도 기계준설공사	`23.04.12	21,967	19,770	지방계약법 시행령 제25조 의거 (소액수의)	㈜대원 엔지니어링 (류용선)
동문거리 LED가로등 조도개선 교체공사	`23.04.14.	12,091	10,881	지방계약법 시행령 제25조 의거 (소액수의)	(유)삼부전기 (송기성)
전통문화전당 외1개소 LED가로등 교체공사	’23.07.10.	21,119	19,007	지방계약법 시행령 제25조 의거 (소액수의)	(유)경원전력 (이종국)
통일광장 분수대 제어반 패널 교체공사	`23.06.21.	15,738	14,164	지방계약법 시행령 제25조 의거 (소액수의)	㈜일오삼전력 (박성남)
서학로 특화거리 조도 개선공사	`23.08.29.	17,446	15,701	지방계약법 시행령 제25조 의거 (소액수의)	(유)신태양전력공사 (임낙범)
동완산동 새뜰마을 23년 집수리 지원사업	`23.10.19	14,059	12,653	지방계약법 시행령 제25조 의거 (소액수의)	인터코스(주) (박현옥)
23년도 남노송동 새뜰마을 집수리공사	`23.06.28.	16,740	15,065	지방계약법 시행령 제25조 의거 (소액수의)	㈜혁창건설 (송재한, 서전석)
남노송동 새뜰마을 골목길정비공사	`23.06.29.	20,821	18,242	지방계약법 시행령 제25조 의거 (소액수의)	주식회사 서유건설 (박영이)
팔복동 빈집밀집구역 마을상가 가스배관 공사	’23.07.03	16,999	14,998	지방계약법 시행령 제25조 의거 (소액수의)	(유)가람 엔지니어링 (문상호)
팔복동 빈집밀집구역 빈집(4차) 철거 공사	’23.07.12	21,550	19,395	지방계약법 시행령 제25조 의거 (소액수의)	㈜대형건설 (이정근)
팔복동 빈집밀집구역 임시주차장 조성공사	’23.04.06	20,000	18,000	지방계약법 시행령 제25조 의거 (소액수의)	㈜에이앤지건설 (허남열)
인후반촌 도시재생 마을공동공간 조성 전기공사	’23.08.29	17,930	16,137	지방계약법 시행령 제25조 의거 (소액수의)	(유)광신사 (박종호)
2022년 도심빈집정비 주민공간 조성사업 지장물 철거공사 (서서학동)	’22.12.07.	14,498	13,048	지방계약법 시행령 제25조 의거 (소액수의)	전주건축 (오세택)
2022년 도심빈집정비 주민공간 조성사업 지장물 철거공사 (동완산동)	’22.12.09.	21,890	19,701	지방계약법 시행령 제25조 의거 (소액수의)	㈜준건설 (한상남)
노후시설물 정비를 통한 생활 SOC 확충 마을회관 리모델링 공사	’23.09.25.	21,879	19,691	지방계약법 시행령 제25조 의거 (소액수의)	(유)대승산업개발 (경정훈)

○ 물품제조구입(계약금액 5백만원 이상)

(단위 : 천원)

품 명	계약일	설계금액	계약금액	사유	상호(대표)	비고
스마트그린도시 쓰레기 배출시설 태양광 CCTV 구입설치	‘23.09.05.	11,800	10,620	지방계약법 시행령 제25조 의거 (소액수의)	(유)비츠 (왕복순)
스마트그린도시 쿨링앤클린로드 조성사업 클린로드시스템 구입	`23.04.25	746,135	686,000	지방계약법 시행령 제25조 의거 (특허공법심의 결과반영)	레인보우 스케이프(주) (정운익)
서학광장 음수기(석재) 구입	`22.11.01	5,927	5,335	지방계약법 시행령 제25조 의거 (소액수의)	천일석재 (강현녀)
도란도란 시나브로길 안내판(도안) 교체 구입	`23.04.10	5,439	4,894	지방계약법 시행령 제25조 의거 (소액수의)	GD사인 (곽성남)

자료번호 : 13         작성자 : 종합경기장개발과장 김용삼 (인)

자 료 명 : 건설공사 집행내역(도급액 5천만원 이상)

(단위 : 천원)

사업명	위치	공사 개요	공사비 내력					착공일	준공일	진도 (%)	시공자
			예산액	설계액	예정 가액	계약 금액	낙찰율
전주 종합 경기장 부지내 야구장 철거공사	덕진구 기린대로 451 일원	철거공사 5,571㎡	1,097,720	1,097,720	1,097,720	965,228	87.93%	’22.12.29	’23.4.18	100	유한회사 강인
야구장 철거부지 골재포설 공사	덕진구 기린대로 451 일원	야구장 철거 부지 골재 포장 19,800㎡	178,750	178,750	178,750	156,664	87.64%	’23.7.18	’23.9.1	100	주식회사 태정건설
전주 육상경기장 및 야구장 건립사업 기존건축물 해체공사	덕진구 장동 545-1 일원	사업부지 내 기존건축물 (2개동) 전면해체 1식	406,580	406,580	402,336	356,384	88.57%	’23.3.10	’23.6.21	100	(유)동광 이엔씨
전주 육상경기장 및 야구장 건립공사 (건축)	덕진구 장동 545-1 일원	1종 육상경기장 및 야구장 건립	43,616,237	43,616,237	43,352,919	40,755,114	94.0%	’23.6.22	’25.11.28	2	계성건설 주식회사 외 2개사
전주 육상경기장 및 야구장 건립공사 (전기)	덕진구 장동 545-1 일원	1종 육상경기장 및 야구장 건립	7,288,930	7,288,930	7,380,581	6,371,216	86.32%	’23.6.22	’25.11.17	-	하나 이앤지 ㈜ 외 2개사
전주 육상경기장 및 야구장 건립공사 (통신)	덕진구 장동 545-1 일원	1종 육상경기장 및 야구장 건립	4,623,416	4,623,416	4,646,417	4,060,438	87.38%	’23.6.22	’25.11.17	-	㈜태원텍 외 1개사
전주 육상경기장 및 야구장 건립공사 (소방)	덕진구 장동 545-1 일원	1종 육상경기장 및 야구장 건립	3,483,195	3,483,195	3,440,952	3,011,364	87.51%	’23.6.22	’25.11.17	-	㈜선경 이엔에프 외 2개사

자료번호 : 13               작성자 : 도시개발과장 장재영 (인)

자 료 명 : 건설공사 집행내역(도급액 5천만원 이상)

(단위 : 천원)

사업명	위치	공사 개요	공사비 내력					착공일	준공일	진도 (%)	시공자
			예산액	설계액	예정 가액	계약 금액	낙찰율
효천지구연계도로 1단계 확장사업	완산구 삼천동 해성교차로 ∼ 중인나들목	도로확장 및 신설 L=1.9km, B=20∼25m	4,458,498	4,458,498	4,450,049	3,860,391	86.74%	’20.4.21.	’22.12.21.	100	(유)일우 종합건설
효천지구 연계도로 1단계 확장사업 전기공사	완산구 삼천동 해성교차로 ∼ 중인나들목	가로등 및 신호등 신설	263,120	263,120	239,200	232,693	88.46%	’20.7.30.	’23.6.14.	100	㈜대동 전력

자료번호 : 13              작성자 : 도시정비과장 허갑수 (인)

자 료 명 : 건설공사 집행내역(도급액 5천만원 이상)

(단위 : 천원)

사업명	위치	공사 개요	공사비 내력					착공일	준공일	진도 (%)	시공자
			예산액	설계액	예정 가액	계약 금액	낙찰율
도시재생 인정사업 별과함께 다가서당 프로젝트 신축공사 (건축)	다가동4가 25번지 일원	지상2층 522㎡신축	939,688	939,688	939,688	831,092	88.443%	’21.12.22	’22.12.26	100	구룡 건설
도시재생 인정사업 별과함께 다가서당 프로젝트 신축공사 (전기)	다가동4가 25번지 일원	지상2층 522㎡신축	73,590	73,590	74,229	65,162	87.784%	'22.04.14	’22.12.22	100	㈜신후
전주역세권 맛집창업교육관 리모델링공사(건축)	덕진구 우아동3가 746-35	지하1층/ 지상5층 연면적 1,537.32㎡ 리모델링	1,361,932	1,361,932	1,347,553	1,176,839	87.331%	'22.11.17	’23.04.27	100	주식 회사 다함
전주역세권 맛집창업교육관 리모델링공사(소방)	덕진구 우아동3가 746-35	지하1층/ 지상5층 연면적 1,537.32㎡ 리모델링	137,418	137,418	156,597	137,418	87.752%	'22.11.17	’23.04.27	100	㈜대건 기업
전주역세권 맛집창업교육관 리모델링공사(전기)	덕진구 우아동3가 746-35	지하1층/ 지상5층 연면적 1,537.32㎡ 리모델링	215,970	215,970	215,970	191,236	88.547%	'22.12.06	’23.04.27	100	유한 회사 한빛 누리
전주역세권 맛집창업교육관 리모델링공사(통신)	덕진구 우아동3가 746-35	지하1층/ 지상5층 연면적 1,537.32㎡ 리모델링	108,999	108,999	124,223	108,999	87.745%	'22.12.12	’23.05.11	100	주식 회사 창원
전주역세권 도시재생뉴딜 청년맛집창업교육관 부대시설 공사	덕진구 우아동3가 746-35	교육관 5층 사무공간 부대시설 공사	92,158	92,158	91.600	80.415	87.789%	'23.05.02	’23.05.31	100	유한 회사 대승산업개발
전주역세권 도시재생 뉴딜사업 혁신관광 소셜플랫폼 조성사업 부지내 지장물 철거공사	덕진구 우아동3가 745-97	건축물 철거공사 1식	168,652	168,652	166,431	146,157	87.818%	'23.06.22	’23.08.04	100	주식 회사 태웅산업개발
전주역세권 도시재생 뉴딜사업 보행친화도로 조성공사	덕진구 우아동3가 우아로	도로정비 공사 1식	712,877	712,877	720,367	636,622	87.97%	‘21.09.09.	‘23.05.09.	100	수성 건설(주)
서학동예술마을 도시재생 간판제작 설치사업	서학예술 마을일원	간판제작 설치 1식	135,025	135,025	135,025	119,472	88.48%	’22.06.14	’23.09.20	100	제일정보기술 (주)
스마트그린도시 쿨링앤클린로드 조성사업(토목)	신복로 및 신복천변로 일원	빗물활용자동 살수시스템 1식, 빗물정원 1식 등	2,402,319	2,402,319	2,402,319	2,089,292	86.97%	‘22.12.27.	‘23.11.17.	95	㈜대한
스마트그린도시 쿨링앤클린로드 조성사업(전기)	신복로 및 신복천변로 일원	인입공사 1식, 가로등설치 51본 등	231,876	231,876	231,876	206,242	88.95%	‘22.12.27.	‘23.11.17.	95	(유) 메인에너지
스마트그린도시 물순환청정길 조성사업(토목)	신복마을 일원	투수블록 포장 17,904㎡	1,011,330	1,011,330	1,011,330	893,255	88.32%	‘22.12.19.	‘23.11.12.	90	(유)현송
스마트그린도시 물순환청정길 조성사업(스마트 보안등)	신복마을 일원	가로등설치 122개소 등	174,889	174,889	174,889	152,617	87.75%	‘22.11.07.	‘23.11.29.	90	㈜선이엔지
스마트그린도시 물순환청정길 조성사업(스마트폴) 통신공사	신복마을 일원	스마트폴 설치 1식	51,859	51,859	51,859	44,827	86.44%	‘22.11.07.	‘23.12.13	80	㈜지원정보 통신
스마트그린도시 신복1길 정비사업(토목)	신복1길 일원	보도블록 포장 1식 등	367,928	367,928	367,928	325,851	88.56%	‘22.12.23.	‘23.11.24.	80	(유)도영종합건설
스마트그린도시 신복1길 정비사업(전기)	신복1길 일원	가로등설치 16본 등	77,968	77,968	77,968	68,600	87.98%	‘22.12.23.	‘23.11.24.	80	㈜세안
스마트그린도시 신복1길 가로환경정비사업	팔복동2가 798번지 일원	가로수 식재 1식 등	498,857	498,857	498,857	437,723	87.75%	‘23.07.21.	‘23.11.24.	60	(유) 어울림 조경
스마트그린도시 신복로 공영주차장 조성사업(토목)	팔복동1가 178-2번지 일원	주차장 조성 1식	90,079	90,079	90,079	78,541	87.19%	‘23.03.16.	‘23.12.26.	60	(유) 여강 건설
서로돌봄플랫폼 조성사업(건축)	중노송동 703-10 번지 일원	서로돌봄 플랫폼 조성공사 1식	1,415,326	1,415,326	1,400,992	1,226,057	87.213%	‘22.12.19.	‘23.11.30	85	세움종합건설 (주)
2022년 남노송동 새뜰마을 조성사업 공·폐가철거공사	남노송동 152-21 외 3	폐가옥 철거 1식	131,109	131,109	131,890	115,779	87.784%	`22.11.14	`23.02.05	100	(유) 개암 건설
2022년 동완산동 새뜰마을 집수리지원사업	곤지산3길 14번지 외 12가구	집수리	104,206	104,206	104,040	91,292	87.746%	`22.12.02	`23.03.30	100	㈜세희주택 건설
도토리골 절개지 사면안정화 및 보강공사	진북동 923 외 3	비탈면 안정공, 석축공, 부대공 1식	63,341	63,341	63,285	55,559	87.792%	`23.02.08	`23.06.27	100	(유) 신협 토건
동완산동 새뜰마을 인프라 조성사업	곤지산3길 일원	아스콘 포장, 석축쌓기, 논슬립 설치 등	422,125	442,125	422,895	371,081	87.747%	`23.03.29	`23.11.08	100	㈜새찬종합 건설
2023년 아중호수 수변 탐방로 조성사업	우아동1가 산31-1번지 일원	수변탐방로 L=320m 등	531,938	531,938	525,797	464,482	87.754%	`23.06.07	`23.12.15 (중지중)	30	(유) 한림 조경
남노송동 새뜰마을 주민공동이용시설 신축공사(건축)	완산구 남노송동 16-12 외 2필지	신축공사 1식	888,828	888,828	896,161	792,683	88.453%	`23.06.26	`24.03.17	30	주식 회사 제이디
남노송동 새뜰마을 주민공동이용시설 신축공사(전기)	완산구 남노송동 16-12 외 2필지	신축 전기공사 1식	65,473	65,473	65,473	57,459	87.76%	`23.06.26	`24.03.17	30	(유) 이화 전력
덕진구범죄예방환경개선사업(토목)	덕진구 우아2동 아중호수 및 아중초교 일원	고원식횡단보도 및 통학로 정비 ,데크설치 등	164,217	164,217	164,217	144,835	87.768%	`23.07.26	`23.09.22	100	(유) 성제 건설
덕진구 범죄예방 환경개선사업 전기공사	덕진구 우아2동 아중호수 및 아중초등학교 일원	범죄예방 전기공사 1식	77,132	77,132	77,132	67,885	87.753%	`23.07.26	`23.10.23 (일시 정지중)	90	(유) 영우 전력 공사
2023년 아중호수 수변 탐방로 조성 전기공사	덕진구 우아동1가 산 31-1번지 아중호수 일원	데크 경관조명 설치공사 1식	83,404	83,404	83,404	73,738	87.748%	`23.08.24	`24.02.19 (일시 정지중)	-	(유) 에스지이엔지
팔복동 빈집밀집구역 마을상가1호 대수선공사	덕진구 팔복동1가 296-3,8	대수선 공사	261,170	261,170	261,170	227,899	87.756%	’23.04.12	’23.06.10	100	㈜ 리드
팔복동 빈집밀집구역 마을상가2호 대수선공사	덕진구 팔복동1가 303-22	대수선 공사	358,020	358,020	358,020	318,670	87.782%	’23.04.06	’23.06.04	100	신아 종합 건설 (주)
팔복동 빈집밀집구역 마을상가3호 대수선공사	덕진구 팔복동1가 303-31	대수선 공사	365,966	365,966	365,966	322,610	87.754%	’23.04.03	’23.06.01	100	(유) 엠스톤
팔복동 빈집밀집구역 마을상가4호 대수선공사	덕진구 팔복동1가 287-1	대수선 공사	246,971	246,971	246,971	216,615	87.747%	’23.04.03	’23.06.01	100	남아종합건설 (주)
팔복동 빈집밀집구역 오손도손 골목쉼터1 조성공사	덕진구 팔복동1가 303-4	쉼터 조성	154,531	154,531	154,531	136,241	87.788%	’23.06.08	’23.07.30	100	㈜ 우진 산업
완산구 저층주거지 골목길 정비사업	완산구 효동2길 17~17-31	효자1동 골목길 정비 1식 (L=130m)	307,252	307,252	310,280	274,397	88.44%	’21.12.27	’23.06.27	100	유한 회사 도시 산업 개발
덕진구 저층주거지 골목길 정비사업	덕진구 모래내5길 21-31일원	인후2동 골목길 정비 1식 (L=204m	233,288	233,288	235,061	207,531	88.29%	’22.10.31	’23.04.06	100	유한 회사 임팩트건설
2023년 도심빈집정비 주민공간 조성사업 지장물 철거공사	팔복동2가 20-37 등 9개소	지장물 철거 1식	79,860	79,860	79,860	71,014	89%	23.8.16.	일시정지	70	토성 토건 (주)

자료번호 : 14         작성자 : 종합경기장개발과장 김용삼 (인)

자 료 명 : 공사 설계변경 내역(5백만원 이상)

(단위 : 천원)

공사명	계약 일자	준공 일자	당초 공사비			설계변경				시공자
			설계금액	예정금액	계약금액	일자	변경금액	증감액	사유
전주종합 경기장 부지내 야구장 철거공사	’22.12.19	’23.04.18	1,097,720	1,097,720	965,228	’23.04.26	1,065,600	증100,372	현장여건 반영, 해체심의 의견 반영, 미사용 경비 정산 등	유한회사 강인
야구장 철거부지 골재포설공사	’23.07.17	’23.09.01	180,570	180,570	156,664	’23.08.25	183,213	증26,549	업무지시에 따른 변경 및 현장여건 반영	주식회사 태정건설

자료번호 : 14               작성자 : 도시개발과장 장재영 (인)

자 료 명 : 공사 설계변경 내역(5백만원 이상)

(단위 : 천원)

공사명	계약 일자	준공 일자	당초 공사비			설계변경				시공자
			설계금액	예정금액	계약금액	일자	변경금액	증감액	사유
효천지구연계도로 1단계 확장사업	’20.4.16	’22.12.21.	4,539,089	4,539,089	4,539,089	’22.11.22.	4,688,634	증149,545	관련부서 협의 및 현장여건 반영	(유)일우 종합 건설
			4,688,634	4,688,634	4,688,634	’22.12.16.	4,623,691	감64,943	현장여건 반영 및 간접비 정산	(유)일우 종합 건설

자료번호 : 14              작성자 : 도시정비과장 허갑수 (인)

자 료 명 : 공사 설계변경 내역(5백만원 이상)

(단위 : 천원)

공사명	계약 일자	준공 일자	당초 공사비			설 계 변 경				시공자
			설계금액	예정금액	계약금액	일자	변경금액	증감액	사유
전주역세권 맛집창업 교육관 리모델링 공사(건축)	’22.11.14	’23.04.27	1,361,932	1,347,553	1,176,839	’23.04.14	1,191,003	증14,164	현장여건반영	주식회사 다함
전주역세권 맛집창업 교육관 리모델링 공사(전기)	’22.12.05	’23.04.27	215,970	215,970	191,236	’23.04.24	209,730	증18,494	현장여건반영	유한회사 한빛누리
전주역세권 도시재생 보행친화 도로 조성공사 임목폐기물 처리용역	‘21.09.13.	‘23.02.22.	22,484	22,484	19,792	‘23.02.15	2,313	감17,479	사업계획 변경	(유)우리환경 이엔지
전주역세권 도시재생 뉴딜사업 보행친화도로 조성공사	’21.09.09.	‘23.05.09.	712,877	720,367	583,927	‘23.04.26.	624,252	증40,325	민원사항 반영 등	수성건설 (주)
스마트그린도시 물순환청정길 조성사업 (토목)	‘22.12.19.	‘23.11.12.	1,011,330	1,011,330	893,255	‘23.03.14.	940,884	증47,629	현장여건 반영	(유)현송
스마트그린도시 물순환청정길 조성사업 (스마트보안등)	‘22.11.04.	‘23.11.12.	174,889	174,889	152,617	‘23.07.19.	125,271	감27,346	현장여건 반영	㈜선이엔지
스마트그린도시 물순환청정길 조성사업 (스마트폴- 통신공사)	‘22.11.07.	‘23.12.13	51,859	51,859	44,827	‘23.07.21.	58,759	증13,932	현장여건 반영	㈜지원정보통신
서로돌봄 플랫폼 조성 사업(통신)	‘22.12.29	‘23.11.30	55,110	54,479	47,810	‘23.07.12	58,134	증10,324	현장여건 반영	㈜제이 케이 네트웍스
2022년 동완산동 새뜰마을 집수리 지원사업	`22.12.02	`23.04.06	104,206	104,040	91,292	`23.03.30	104,070	증12,778	주민 추가시공 요청 및 현장여건 반영에 따른 물량 증감	㈜세희주택건설
도토리골 절개지 사면안정화 및 보강공사	`23.02.08	`23.06.27	63,341	63,285	55,559	`23.06.22	120,000	증64,441	현장여건을 고려한 공법변경 등	(유)신협토건
통일광장 분수대 제어반 패널 교체공사	’23.06.21.	’23.08.28.	15,738	15,738	14,164	’23.07.07.	19,489	증5,325	공사내역 변경	㈜일오삼전력
팔복동 빈집밀집구역 마을상가1호 대수선공사	’23.04.06	’23.06.10.	261,170	261,170	227,899	’23.04.26	240,830	증12,931	현장여건 반영	㈜리드
					240,830	’23.06.08	259,485	증18,655	현장여건 및 설계도서 반영
팔복동 빈집밀집구역 마을상가2호 대수선공사	’23.03.30	’23.06.04	358,020	358,020	318,670	’23.04.26	325,110	증6,440	현장여건 반영	신아종합 건설(주)
팔복동 빈집밀집구역 마을상가3호 대수선공사	’23.03.27	’23.06.01	365,966	365,966	322,610	’23.04.26	329,172	증6,562	현장여건 반영	유한회사 엠스톤
					329,172	’23.05.31	344,172	증15,000	현장여건 및 설계도서 반영
					344,172	’23.06.05	328,728	감15,444	미사용 보험료 등 정산
팔복동 빈집밀집구역 마을상가4호 대수선공사	’23.03.28	’23.06.01	246,971	246,971	216,615	’23.04.25	219,658	증3,043	현장여건 반영	남아종합 건설(주)
					219,658	’23.06.07	209,960	감9,698	미사용 보험료 등 정산
팔복동 빈집밀집 구역 오손도손 골목쉼터1 조성공사	’23.05.30	’23.07.30	154,531	154,531	136,241	’23.07.06	151,670	증15,429	현장여건 및 설계도서 반영	주식회사 우진산업
					151,670	’23.07.27	160,400	증8,730	현장여건 반영
2022년 도심빈집정비 주민공간 조성사업 지장물 철거공사	’22.8.11.	’23.12.13.	45,453	45,453	40,048	’23.11.30	79,497	증39,449	현장여건 및 설계 누락분 반영 (가림막설치, 성상분류 등)	㈜준건설
인후반촌 도시재생 집수리 지원사업	’22.11.30	’23.03.29	388,509	340,026	340,026	’23.03.28	361,373	증21,347	현장여건 반영, 신청자 변심에 의한 변경, 보험료 정산	(유)대상개발
인후반촌 안심골목 정원화사업	’22.08.10	’23.08.17 (일시정지: ’23.08.07)	877,237	835,757	701,980	’23.01.10	759,600	증57,620	인력철거 반영, 담장철거 및 추가공사	(유)성신종합건설
					759,600	’23.01.13	747,235	감12,365	보험료 정산
인후반촌 도시재생 마을공동 공간 조성공사	’23.07.14	’23.10.14	159,735	154,523	37,204	’23.09.15	57,290	증20,086	지반경사 평탄화, 담장 보수 및 도색, 보험료정산	㈜라온 에너텍
완산구 저층주거지 골목길 정비사업	’21.12.13	’23.06.27	373,538	310,280	274,397	’22.04.13	390,720	증116,323	오수관로 공사반영	(유)도시 산업 개발
					390,720	’22.12.07	431,387	증40,667	정화조 폐쇄, 지장물 추가 철거
					431,387	’23.01.20	442,033	증10,646	물가변동
					442,033	’23.06.23	422,310	감19,723	보험료 정산
덕진구 저층주거지 골목길 정비사업	’22.10.13	’23.04.07	277,103	251,346	207,531	’23.03.24	236,886	증29,355	현장여건 반영, 보험료 정산	(유)임팩트건설

자료번호 : 15        작성자 : 종합경기장개발과장 김용삼 (인)

자 료 명 : 용역비 집행내역【중지된 용역(사유명기)포함】: 1천만원 이상

(단위 : 천원)

사업명	용역개요	용 역 비 내 력					계약방법	계약일	납품일	계약자	진행상황 (중지시 사유 명기)
		예산액	설계액	예정가액	계약금액	낙찰율
전주종합 경기장 부지내 야구장 철거공사 실시설계 용역	실시 설계 1식	36,542	36,542	36,542	32,079	87.78%	수의 소액 (2인이상 견적)	’22.9.21	’22.12.16	두손 구조 기술사사무소	완료
전주종합 경기장 부지내 야구장 철거공사 감리용역	공사 감리 1식	46,723	46,723	46,723	42,050	89.99%	수의 1인 견적 (허가권자 지정 통지)	’22.12.23	’23.4.25	디에스 건축사 사무소	완료
전주종합 경기장 부지내 야구장 철거공사 폐합성 수지처리 용역	폐합성수지 운반 및 처리 1식	19,500	19,500	19,500	17,550	90%	수의 1인 견적	’23.3.31	’23.4.12	유한회사 계룡환경 산업	완료
전주종합 경기장 부지내 야구장 철거공사 임목폐기물 처리용역	임목 폐기물 운반 및 처리 1식	16,500	16,500	16,500	14,850	90%	수의 1인 견적	’22.12.29	’23.4.13	주식회사 그린 이엔티	완료
전주종합경기장 부지내 야구장 철거공사 건설폐기물 처리용역	건설 폐기물 운반 및 처리 1식	429,893	429,893	429,893	372,366	86.61%	제한 경쟁 (지역 제한)	’22.12.28	’23.7.5	주식회사 모악환경 산업	완료
야구장 철거부지 골재포설 공사 실시설계용역	실시 설계 1식	17,204	17,204	17,204	15,483	89.99%	수의 1인 견적	’23.7.6	’23.7.13	주식회사 국성건설 엔지니어링	완료
종합 경기장 철거 해체계획서 작성용역	해체 계획서 작성 1식	21,670	21,670	21,670	19,503	90%	수의 1인 견적	’23.10.16	’24.1.16	sw 건축사 사무소	진행중
전주종합 경기장 철거 실시설계 용역	실시 설계 1식	177,001	177,001	177,001	157,172	88.79%	제한 경쟁	’23.10.16	’24.4.18	주식회사 혜원 이엔지	진행중
전주 육상경기장 및 야구장 건립 기존건축물 해체계획서 작성·검토 용역	해체계획서 작성·검토	19,910	19,910	19,910	17,919	90%	수의 계약	’23.1.17	’23.3.28	풍경 건축사 사무소	완료
전주 육상경기장 및 야구장 건립 건설폐기물 처리용역	폐기물 운반·처리 1식	497,384	497,384	494,963	429,825	86.83%	제한 (총액)	’23.3.2	’25.10.12	㈜모악환경산업	진행중
전주 육상경기장 및 야구장 건립 가연성(재활용) 폐기물처리 용역	폐기물 운반·처리 1식	16,405	16,405	16,405	14,764	90%	수의 계약	’23.3.13	’25.8.26	(유)우리환경이엔지	진행중
전주 육상경기장 및 야구장 건립사업 기존건축물 해체공사 감리용역	기존건축물 해체공사 감리	19,198	19,198	19,198	17,278	90%	수의 계약	’23.3.23	’23.6.23	풍경 건축사 사무소	완료
전주 육상경기장 및 야구장 건립 기공식 행사 용역	사전준비 및 무대설치 등 행사지원	19,899	19,899	19,899	17,909	90%	수의 계약	’23.5.16	’23.6.29	파스텔 미디어	완료
전주 육상경기장 및 야구장 건립 토양오염 반출정화 처리 용역	오염토양 반출정화 처리	93,472	93,472	93,074	82,318	88.44%	수의 (총액) 소액-견적입찰	’23.6.19	’23.12.15	㈜동명엔터프라이즈	진행중
전주 육상경기장 및 야구장 건립 임목폐기물 처리용역	임목폐기물 운반·처리 1식	35,748	35,748	36,110	35,720	98.91%	수의 (총액) 소액-견적입찰	’23.9.18	’24.3.16.	(유)우리환경이엔지	진행중
전주 육상경기장 및 야구장건립 가연성(소각) 폐기물 처리 용역	폐기물 운반·처리 1식	23,872	23,872	23,872	20,797	87.1%	수의 (총액) 소액-견적입찰	’23.7.4	’25.1217	이도에코 전주(주)	진행중
전주 전시컨벤션 센터 건립 타당성조사 용역	타당성조사용역 1식	21,800	21,800	21,800	19,620	90%	수의1인견적	'23.8.23	'23.11.22	경희대학교 산학협력단	진행중

자료번호 : 15         작성자 : 재개발재건축과장  국승철 (인)

자 료 명 : 용역비 집행내역【중지된 용역(사유명기)포함】:1천만원 이상

(단위 : 천원)

사업명	용역개요	용 역 비 내 력					계약방법	계약일	납품일	계약자	진행상황 (중지시 사유 명기)
		예산액	설계액	예정가액	계약금액	낙찰율
2030 전주시 도시주거환경정비기본계획수립용역	도시 및 주거환경 정비기본 계획 1식	700,000	684,290	679,621	583,800	85.90%	총액 입찰	’19.5.27.		㈜경호엔지니어링외1	용역 일시정지 (관계기관 협의 및 행정절차 이행 등)
2030 전주시 도시주거환경정비기본계획약식전략환경영향평가용역	약식전략환경영향평가 1식	95,210	95,210	94,137	83,374	88.56%	수의 2인	’23.3.3.	’24.2.17.	㈜인우	공정률 80% (자연생태 환경 등 조사 중)

자료번호 : 15               작성자 : 도시개발과장 장재영 (인)

자 료 명 : 용역비 집행내역【중지된 용역(사유명기)포함】 : 1천만원 이상

(단위 : 천원)

사업명	용역개요	용 역 비 내 력					계약방법	계약일	납품일	계약자	진행상황 (중지시 사유 명기)
		예산액	설계액	예정가액	계약금액	낙찰율
효천지구 연계도로 1단계 확장사업 GIS DB구축용역	GIS DB 구축 1식	94,539	94,539	94,643	83,339	88.056%	제한 경쟁	’21.6.8.	’23.10.18.	㈜바른땅 지적측량	완료
만성지구∼ 기지제간 생태육교 설치 기본 및 실시설계 용역	기본 및 실시설계 1식	182,500	182,500	181,321	159,181	87.789%	제한 경쟁	’22.4.29.		㈜한가람	일시정지 (행정절차 이행 / ’22.9.20.)
만성지구∼ 기지제간 생태육교 설치사업 전기공사 실시설계용역	실시설계 1식	11,760	11,760	11,760	10,584	90.000%	수의	’22.12.23.		대한엔지니어링	일시정지 (행정절차 이행 / ’23.2.14.)
공공청사 이전사업 재해영향성 검토용역	재해 영향성 검토 1식	27,400	27,400	27,133	24,184	89.131%	제한 경쟁	’21.10.20.	’23.7.26.	㈜세화엔지니어링	완료
공공청사 이전사업 도시관리계획 (용도지역, 공공청사) 결정(변경) 용역	도시관리 계획결정 (변경) 1식	217,600	217,600	218,693	192,019	87.802%	제한 경쟁	’21.11.3.	’23.8.3.	주식회사 건일	완료
에코시티 서측 연계도로 도시계획시설 (도로)결정용역	도시계획 시설(도로) 결정용역 1식	160,000	157,400	154,823	136,824	88.374%	제한 경쟁	’21.2.26.		(유)승우엔지니 어링	일시정지 (관계기관 협의 및 최적(안) 검토 / ‛21.10.26.)
에코시티 서측 연계도로 도시계획시설(도로)재해영향성 검토용역	재해 영향성 검토 1식	23,176	21,100	21,100	18,990	90%	수의	’22.7.18.		주식회사 더한건설	일시정지 (도시계획시설 결정용역과 병행 / ‛22.9.16)

자료번호 : 15              작성자 : 도시정비과장 허갑수 (인)

자 료 명 : 용역비 집행내역【중지된 용역(사유명기)포함】: 1천만원 이상

(단위 : 천원)

사업명	용역 개요	용 역 비 내 력					계약방법	계약일	납품일	계약자	진행상황 (중지시 사유 명기)
		예산액	설계액	예정 가액	계약금액	낙찰율
금암고 일원 도시재생사업 (국토부 우리동네살리기 공모사업) 실행계획 수립 용역	실행계획 수립 1식	120,000	120,000	120,000	96,000	80%	협상에 의한 계약	’23.3.24.	’23.9.15.	㈜인우	완료
종합경기장 일원 도시재생사업 (국토부 혁신지구 공모사업) 개발 타당성 및 기본계획 수립 용역	개발 타당성 및 기본계획 수립 1식	16,500	16,500	16,500	14,850	90%	수의 1인 견적	’23.5.15.	’23.9.15.	㈜인우	완료
전주역세권 도시재생뉴딜 혁신관광소셜플랫폼 건축기획설계 용역	건축 기획설계	21,426	21,426	21,426	19,283	90%	수의1인견적	’22.5.11	’22.12.15	제이 엔디 건축사 사무소	완료
전주역세권 도시재생뉴딜 혁신관광소셜 플랫폼 지하주차장조성 기획설계용역	지하주차장 조성 기획설계	16,211	16,211	16,211	14,590	90%	수의1인견적	’22.8.11	’22.12.15	제이 엔디 건축사 사무소	완료
전주역세권 청년 창업 레지던시 리모델링 기본 및 실시 설계 용역	청년창업 레지던시 기본 및 실시 설계용역	21,747	21,747	21,747	19,572	90%	수의1인견적	’22.9.13		예손 건축사사무소	용역일시중지 (’22.11.14.) 기본구상 수립 등 선행절차 이행
전주역세권 청년 창업레지던시 리모델링정밀안전 진단용역	정밀 안전 진단용역	19,503	19,503	19,503	17,553	90%	수의1인견적	’22.9.13		주식회사제이유안전진단연구원	용역일시중지 (’22.11.14.) 기본구상 수립 등 선행절차이행
전주역세권 혁신관광 소셜플랫폼 조성사업 지질조사용역	지질조사용역 1식	14,531	14,531	14,531	13,077	90%	수의1인견적	’22.12.14	’23.7.24	㈜건설품질 시험원	완료
전주 역세권 도시재생 뉴딜사업 혁신관광소셜플랫폼 (구,농심) 철거공사 실시설계용역	건축물 철거설계용역 1식	19,382	19,382	19,382	17,443	90%	수의1인견적	’23.3.14	’23.7.10	예 건축사 사무소	완료
전주역세권 맛집창업운영관 리모델링공사 기본 및 실시 설계 용역	맛집창업운영관 리모델링 기본 및 실시설계	21,065	21,065	21,065	18,958	90%	수의1인견적	’23.3.31		건축사사무소채담	용역일시중지 (’23.6.23) 공공디자인 심의 등 행정절차 이행
전주역세권 도시재생 뉴딜사업 혁신관광소셜플랫폼 부지내 지장물 철거공사 (구,농심) 감리용역	지장물 철거공사 감리용역	14,202	14,202	14,202	12,781	90%	수의1인견적	’23.7.3	’23.7.24	예 건축사 사무소	완료
전주역세권 도시재생 뉴딜사업 혁신관광소셜플랫폼 부지내 지장물 철거공사 (구,,농심) 폐기물처리 용역	지장물 철거공사 폐기물 처리용역	103,906	103,906	103,228	91,002	88.156%	수의2인이상견적	’23.7.18	’23.8.10	(유)대성환경	완료
덕진권역 도시재생 활성화계획(변경) 수립용역	도시재생활성화 계획 변경 1식	70,000	69,630	69,630	60,966	87.56%	입찰	’23.8.30	’24.4.29	㈜정안이엔씨	진행중
스마트그린도시 쿨링앤클린로드 조성사업 폐기물처리용역	폐기물 처리1식	194,502	194,502	194,502	169,223	87.004%	입찰계약	‘22.12.26.	‘23.11.17.	㈜태경	진행중
스마트그린도시 쿨링앤클린로드 조성사업 GIS 구축 용역	GIS구축 1식	21,844	21,844	21,844	19,659	90%	수의1인견적	‘23.5.19.	‘23.12.31.	㈜고원공간 정보	진행중
스마트그린도시 물순환청정길 조성사업 폐기물처리용역	폐기물 처리1식	244,860	244,860	244,860	213,749	87.29%	입찰계약	‘22.12.28.	‘23.11.12.	(유)대한환경	진행중
스마트그린도시 신복1길 정비사업 폐기물처리용역	폐기물 처리1식	38,797	38,797	38,797	34,126	87.96%	입찰계약	‘22.12.27.	‘23.11.24.	(유)전일환경	완료
스마트그린도시 신복1길 정비사업 폐기물처리용역 (2차)	폐기물 처리1식	49,588	49,588	49,588	43,526	87.78%	입찰계약	‘22.8.21.	‘23.12.19	(유)천변토건 환경	진행중
스마트그린도시 신복1길 가로환경 정비사업 설계용역	설계 1식	20,130	20,130	20,130	18,117	90%	수의1인견적	‘23.5.2.	‘23.6.30.	국성건설엔지니어링	완료
스마트그린도시 신복1길 혼합폐기물 처리용역	혼합 폐기물 처리 1식	21,780	21,780	21,780	19,602	90%	수의1인견적	‘23.8.2.	‘23.8.26.	(유)우리환경이엔지	완료
서로돌봄플랫폼 조성사업 건축감리 용역	건축감리용역 1식	24,314	24,314	24,161	21,265	88.012%	입찰계약	‘22.12.19	‘23.11.30	아인 건축사 사무소	진행중
’22년 공폐가 철거공사 건설폐기물 처리용역	건설 폐기물 처리 1식	64,020	64,020	63,042	56,146	89.061%	입찰	`22.12.8	`23.3.1	(유)천변토건환경	완료
도토리골 절개지 사면안정화 및 보강공사 실시설계용역	안정성 검토 및 실시설계용역 1식	13,546	13,546	13,546	12,191	12,191%	수의	`22.12.8	`23.1.7	㈜건설품질시험원	완료
’22년 남노송동 새뜰마을 조성사업 공폐가철거공사 생활폐기물 처리용역	생활 폐기물 처리 1식	18,772	18,772	18,772	16,849	89.996%	입찰	`22.12.29	`23.3.19	(유)우리환경이엔지	완료
전주시 덕진구 범죄예방 환경개선사업 실시설계용역	실시설계 1식	42,097	42,097	41,786	36,773	88.003%	수의소액 (2인 이상 견적)	`23.1.25	`23.7.14	㈜인우	완료
전주시 서학광장 경관시설 조성사업 기본 및 실시설계용역	기본 및 실시설계 1식	35,948	35,948	35,808	31,517	88.016%	수의소액 (2인 이상 견적)	`23.3.14	`23.6.18 (중지중)	(유)신한엔지니 어링	중지중 (행정절차 이행에 따른 일시 중지)
’23년 광장분수 및 워터미러 청소용역	청소용역 1식	17,052	17,052	17,052	15,346	90%	수의	`23.5.25	`23.9.27	(유)푸른환경	완료
남노송동 새뜰마을 주민공동이용시설 신축공사 건축감리용역	건축감리 용역 1식	13,620	13,620	13,620	12,258	90%	수의	`23.6.29	`24.3.21	제이앤디건축사사무소	용역 착수
낙수정새뜰마을 마스터플랜수립 및 실시설계용역	마스터플랜수립 및 실시설계용역 1식	252,153	252,153	252,153	244,000	96.7%	협상에의한 계약	`23.10.23	`24.8.22	㈜인우	용역 착수
팔복1지역 (주거지지원형) 도시재생 활성화계획 (변경)수립 용역	도시재생 활성화 계획 변경 용역 1식	54,241	52,241	54,241	47,630	90%	일반 (총액)	‘22.8.1.	`24.1.19	(사)어반 베이스	진행중
팔복동 빈집밀집구역 돌봄방앗간 조성사업 설계용역	마을 돌봄 거점시설 신축 설계	74,173	74,173	73,790	64,937	88%	견적 입찰 (2인 이상)	’21.12.16		사유 디자인 건축사사무소	일시정지 ('22.4.7∼) 지역주민의견수렴 및 계획 변경에 따른 지연
팔복동 빈집밀집구역 주민공동이용시설 (그린숲도서관) 설계용역	주민공동 이용시설 신축 설계	53,999	53,999	53,999	47,524	88.003%	견적 입찰 (2인 이상)	’21.7.16.		건축사 사무소 정건축	일시정지 ('23.1.20~) 지역주민의견수렴 및 계획 변경 검토중
팔복동 빈집밀집구역 오손도손 골목쉼터1 조성 설계용역	쉼터 설계 용역	22,000	22,000	22,000	19,800	90%	수의1인 견적	’23.3.24	’23.5.10	택인 환경 디자인	완료
팔복동 빈집밀집구역 마을상가 1호 건설폐기물 처리용역	폐기물 처리 1식	20,225	20,225	20,225	18,202	90%	수의1인 견적	’23.4.5	’23.6.2	(유) 천변 토건 환경	완료
팔복동 빈집밀집구역 마을상가 2호 건설폐기물 처리용역	폐기물 처리 1식	12,648	12,648	12,648	11,383	90%	수의1인 견적	’23.4.06	’23.4.20	㈜한결 이엔티	완료
팔복동 빈집밀집구역 마을상가 4호 건설폐기물 처리용역	폐기물 처리 1식	12,199	12,199	12,199	10,979	90%	수의1인 견적	’23.4.7	’23.6.5	(유) 전일 환경	완료
팔복동 빈집밀집구역 빈집 주변 건설 폐기물 처리 용역	폐기물 처리 1식	12,084	12,084	12,084	10,986	90%	수의1인 견적	’23.8.2	’23.8.25	(유) 천변 토건 환경	완료
팔복동 빈집밀집구역 경관매뉴얼 수립 용역	경관매뉴얼 수립 1식	21,923	21,923	21,923	19,730	90%	수의1인 견적	’23.9.8	’23.12.6	㈜ 도시공간디자인 에이치트리	진행중
인후반촌 안심골목 정원화사업 폐기물처리용역	폐기물처리 1식	55,957	55,907	48,906	48,906	87.48%	입찰계약	’22.8.11		㈜강성산업 개발 대표 김도근	일시정지: ’23.8.7 (폭염 대응 및 민원처리)
인후반촌 도시재생 마을공동공간 조성 기본 및 실시설계용역	기본 및 실시설계 1식	34,375	34,375	30,210	30,210	87.88%	입찰계약	’23.1.13	’23.6.14	㈜영원 대표 하태원	완료
인후반촌 도시재생 마을공동공간 조성 공폐가 철거공사 건설폐기물처리 용역	폐기물처리 1식	12,111	12,111	10,899	10,899	90%	수의계약	’23.4.13	’23.5.26	(유)전일환경 대표 송기순	완료
인후반촌 도시재생 집수리지원사업 (2차) 실시설계용역	실시설계 1식	40,997	40,997	36,008	36,008	87.83%	입찰계약	’23.5.8	’23.8.4	온유 건축사 사무소	완료
2023년 전주시 빈집 실태조사용역	실태조사 1식	27,000	27,000	27,000	24,000	89%	수의1인견적	‘23.7.19	’24.2.20.	한국 부동 산원	진행중
노후시설물 정비를 통한 생활 SOC 확충 쌈지공원 조성 기본 및 실시설계 용역	기본 및 실시설계 1식	13,365	13,365	13,365	12,028	90%	수의1인견적	‘23.7.26		㈜ 더한 건설	용역일시정지 (’23.9.18.) 관련 행정절차 이행
탄소중립 실천마을 거점 신축공사 기본 및 실시설계 용역	기본 및 실시설계 1식	21,439	21,439	21,439	19,295	90%	수의1인견적	‘23.8.11	’23.12.8.	송택신 건축사 사무소	진행중
2023년 도심빈집정비 주민공간 조성사업 건설폐기물 처리용역	폐기물 처리 1식	38,830	38,830	38,830	34,296	88.3%	견적 입찰 (2인 이상)	’23.8.18	’23.11.6.	(유) 개암 이엔티	진행중
2023년 도심빈집정비 주민공간 조성사업 지정폐기물 처리용역	폐기물 처리 1식	35,910	35,910	35,910	30,570	85%	견적 입찰 (2인 이상)	’23.8.21	’23.9.22.	(유) 초원 석면 환경	완료
탄소중립 실천마을 거점 신축공사 에너지효율 등급, 제로에너지 예비인증 및 본인증 용역	에너지 효율등급, 제로 에너지 예비인증 및 본인증 1식	21,978	21,978	21,978	19,780	90%	수의1인견적	’23.10.13	’24.2.9.	제로에너지 건축연구소	진행중
노후시설물 정비를 통한 생활 SOC 확충 건설폐기물 처리용역	폐기물 처리 1식	15,103	15,103	15,103	13,592	90%	수의1인견적	’23.10.23	’23.11.19	(유) 전일 환경	진행중

자료번호 : 21         작성자 : 재개발재건축과장  국승철 (인)

자 료 명 : 연구개발비 집행현황

(단위 : 천원)

사업명	사업내용	예산액	집행액	사업수행자		비 고
				상호	성명
2030 전주시 도시주거환경정비기본계획 수립 용역	도시및주거환경정비 기본계획 1식	700,000	440,095	㈜경호 엔지니어링외 1	조영수
2030 전주시 도시주거환경정비기본계획 약식전략환경영향평가 용역	약식전략환경영향평가 1식	95,210	46,000	㈜인우	송일섭

자료번호 : 22              작성자 : 도시정비과장 허갑수 (인)

자 료 명 : 민간경상보조 집행현황

(단위 : 천원)

사업명	사업내용	예산액	집행액	사업수행자		비고
				상호	성명
서학동 예술마을 주민역량강화사업(Ⅰ)	거점시설 시범운영 프로그램 등	50,000	50,000	전주시 도시재생지원센터	소영식
서학동 예술마을 주민역량강화사업(Ⅱ)	도시재생사업 종합성과평가 보고서 및 거점시설 활성화 프로그램 운영 등	50,000	50,000	전주시 도시재생지원센터	소영식
2023 전주역세권 지역활성화사업(Ⅰ) 교부	주말장터	40,000	40,000	전주시 도시재생지원센터	소영식
	기존상가 업종전환 및 고도화교육	12,000	12,000
	재생사업 성과 및 부동산 모니터링	60,000	60,000
2023 전주역세권 지역활성화사업(Ⅱ) 교부	주민협의체 운영, 사업추진협의회 운영	49,000	49,,000	전주시 도시재생지원센터	소영식
2023 전주역세권 지역활성화사업(Ⅲ) 교부	주민협의체 운영, 사업추진협의회 운영	11,000	11,000	전주시 도시재생지원센터	소영식
	빈공간 조사 및 활용, 창업교육	10,000	10,000
도시재생아카데미 및 지원센터 운영	도시재생사업 박람회 공유공간 네트워크 로컬브랜딩 연구	47,667	47,667	전주시 도시재생지원센터	소영식
2023년 남노송동 새뜰마을 주민역량강화사업 보조금 교부	․주민공동체 프로그램 ․커뮤니티 활용계획 수립 및 주민맞춤형 서비스제공 ․마을경관조성 및 마을환경개선	56,174	56,174	전주시 도시재생지원센터	소영식
2023년 동완산동 새뜰마을 주민역량강화사업 보조금 교부	․도시재생대학 ․주민공동체 프로그램 ․자발적생태골목조성 등	51,000	51,000	전주시 도시재생지원센터	소영식
마중길 콘서트	밴드와 국악을 접목한 퓨전음악공연	6,000	6,000	문화예술단체 공감	최종한
어울림 터 첫마중길!	풍물놀이, 한국무용	5,830	5,830	한소리	서미자
첫마중길 문화의 거리	마을장터, 컨셉마켓 운영 거리공연, 상설버스킹, 공예체험 등	16,000	16,000	전주문화나들이	남궁은희
주말 N 첫마중 상설공연	문화예술공연 (국악밴드,비보이,무용등)	10,000	10,000	예술공감 하랑	강나루
2023 첫마중길 '역전마켓'	첫마중 오픈 마켓 버스킹 공연 등	16,000	16,000	문화공동체 여민	이종하
2023 첫마중길 통큰 문화페스티벌	스포츠 광장 설치 레저체험물 설치 및 운영	9,100	9,100	(사)전북레저스포츠산업진흥원	김형채
2022년 팔복동 빈집밀집구역 주민역량강화사업	·도시농업 ·주민협의체운영 ·아카이빙 ·환경 리빙랩	170,000	170,000	전주시 도시재생지원센터	소영식
인후반촌 도시재생 공동체 활성화사업(Ⅰ) 보조금 교부	·주민역량강화 및 공동체지원사업	65,340	65,340	전주시 도시재생지원센터	소영식
인후반촌 도시재생 공동체 활성화사업(Ⅱ) 보조금 교부	·주민역량강화 및 공동체지원사업	134,660	134,660	전주시 도시재생지원센터	소영식

자료번호 : 24              작성자 : 도시정비과장 허갑수 (인)

자 료 명 : 민간위탁 시설별 현황

(단위 : 천원)

시설명	수탁자	위탁 기간	사업비용						비고
			2023년			2022년
			시지원	자체	자립율	시지원	자체	자립율
전주시 도시재생지원센터	사이시옷 대표 김명규	‘22.∼’23.	664,323		0%	451,380		0%

자료번호 : 28             작성자 : 도시정비과장 허갑수  (인)

자 료 명 : 5천만원이상 사업 불용액 현황

(단위 : 백만원)

사업명	사업개요	예산액	집행액	불용액	불용사유	비고
서학동 예술마을 도시재생 뉴딜사업	거점시설조성, 가로정비사업, 노후주거지 정비 및 주민역량강화 및 거버넌스구축 등	4,819	4,212	137	단위사업 완료로 인한 집행잔액
동문예술 거리 활성화사업	가로정비 실시 및 기본시설 용역	57		57	사업계획변경에 따른 가로정비 용역계약 취소

자료번호 : 29         작성자 : 종합경기장개발과장 김용삼 (인)

자 료 명 : 전주시 전시컨벤션센터 운영계획 수립

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023. ∼ 2024.(착수일로부터 12개월)

○ 위    치 : 전주시 덕진구 기린대로 451 일원(종합경기장 일원)

○ 사 업 비 : 300백만원(시비) ※ 1차분 200백만원

○ 사업내용 : 전시컨벤션센터 운영계획 수립 용역 1식

- 국제회의, 전시 등 대규모 행사유치를 위한 차별화 운영 전략 수립

- 우리시 특화 전담조직 구성(안) 제시

- 시민여론 조사 및 주요 컨벤션센터 선진사례 조사

- 기타 컨벤션센터 및 MICE산업 활성화를 위한 대안 제시 등

□ 추진상황

○ 용역과제심의                               : ’23. 5.

○ 용역과제 관련 전문가 및 관계자 간담회      : ’23. 8.

○ 행정절차(사전협의, 일상감사 등) 이행        : ’23. 9.

○ 용역 발주                                  : ’23. 9.

□ 금후계획

○ 용역업체 선정 및 계약                      : ’23. 11. ∼ 12.

○ 용역착수 및 추진                           : ’23. 12. ∼ ’24. 11.

○ 용역보고회(착수, 중간, 최종) 추진            : ’23. 12. ∼ ’24. 11.

자료번호 : 30         작성자 : 종합경기장개발과장 김용삼 (인)

자 료 명 : 전주 종합경기장 부지개발사업(MICE 복합단지 조성)

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022. ∼ 2028. (7개년)

○ 위    치 : 전주시 덕진구 기린대로 451 일원

○ 총사업비 : 약 3,000억원(시비 1,000, 민자 2,000) ※호텔, 백화점 제외

○ 사업규모 : 종합경기장 부지개발 120,715㎡

○ 사업내용 : MICE 복합단지 조성

- 전시컨벤션센터[전시장 2만㎡(실내1만,실외1만), 대회의장(2천명) 1실, 중소회의장 20실]

- 호텔(200실↑, 4성급↑) 및 백화점

※ 종합경기장 내 재정사업 : 문화시설(문화원형, 미술관), S-Town · I-Town(도시재생 뉴딜사업)

□ 추진상황

○ 종합경기장 부지 무상 양여(전라북도→전주시)           : ’05. 12.

○ 전주종합경기장개발 협약체결(전주시↔롯데쇼핑.기부대양여 방식)  : ’12. 12.

○ 기본구상 및 타당성조사ㆍ중앙투자심사 완료            : ’22. 3.

○  MICE 전문기관 자문 및 우수 컨벤션센터 견학(13개소) 및 사업계획 협의   : ’22. 4.～

○ 사업방식 변경 및 감정평가 방안 등 협의(롯데↔전주시)  : ’23. 2.～

○ 변경협약서(안) 마련 및 협약 체결을 위한 행정절차 추진  : ’23. 8.

○ 사업계획변경 및 변경협약(안) 의회 의결(제404회 임시회) : ’23. 9.

○ 공유재산관리계획(처분, 취득, 용도폐지, 대물변제) 의회 의결(제405회 임시회) : ’23. 10.

□ 금후계획

○ 전시시설 건립계획(산자부), 타당성조사(LIMAC), 중앙투자심사(행안부)  : ’23. 11.～

○ 도시개발사업구역지정ㆍ개발계획수립, 건축설계 등 절차이행    : ’24. 1.～

○ 건축인허가 및 종합경기장 부지개발 공사추진           : ’25. 12.～

자료번호 : 31        작성자 : 종합경기장개발과장 김용삼 (인)

자 료 명 : 전주 육상경기장 및 야구장 건립사업

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019.∼2025.(7개년)

○ 위    치 : 전주시 덕진구 장동 545-1 일원(전주 월드컵경기장 일원)

○ 사 업 비 : 1,421억원(국비 180, 시비 876, 지방채 365)

○ 사업내용 : 부지면적 122,645㎡

- 1종 육상경기장 1식(10,082석 연면적 8,079㎡, 지하1/지상3층)

- 야구장 1식(8,176석 연면적 7,066㎡, 지하1/지상2층)

□ 추진상황

○ 2019년 지방재정 투자심사 완료	: ’19. 7.

○ 편입토지(14필지) 매입 및 국유지(3필지) 무상귀속 완료	: ’19. 8.∼’21. 5.

○ 건축 설계 공모 등 각종 용역 완료	: ’19. 11.∼’22. 5.

○ 의회 간담회	: ’21. 1.

○ 실시설계용역 착수	: ’21. 6.

○ 야구장건립 예산 국비(90억원) 확보	: ’21. 12.

○ 실시설계용역 완료	: ’22. 8.

○ 건축 허가 협의 처리 완료                       : ’22. 10.

○ 육상경기장 건립 예산 국비(90억원) 확보	: ’22. 12.

○ 계약심의위원회 심의 완료 및 (1차분)공사 발주	: ’23. 1.

○ 사업부지 내 기존건축물 해체공사 추진	: ’23. 3.∼6.

○ 건립 공사 착공	: ’23. 6.

□ 금후계획

○ 건립공사 추진 및 완료	: ’23. 6. ～ ’25. 11.

자료번호 :  32       작성자 : 종합경기장개발과장 김용삼 (인)

자 료 명 : 옛 대한방직 부지 개발사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 완산구 유연로 220 일원 (전북도청 뒤편)

○ 면    적 : 14필지 / 230,565㎡

○ 용도지역 : 주거용지(도시기본계획), 공업지역(도시관리계획)

○ 소 유 자 : ㈜자광 216,464㎡(93.9%), 도 6,228㎡(2.7%), 시7,873㎡(3.4%)

□ 추진상황

○ 대한방직 소유권 이전(대한방직→(주)자광)	:’17. 10.

○ 주민제안(지구단위계획) 신청서 제출 및 수용불가 회신	:’18. 11.

- 도시기본계획 불부합, 재산관리청(전북도)의 의견 불명확

○ 대한방직 개발 정책제안서 제출(민간제안자→시)	:’19. 3.∼ 5.

○ 사전준비위원회 및 시민공론화위원회 운영	:’20. 2.∼’21. 2.

○ 시민공론화위원회 권고문 제출(위원회→시)	:’21. 2.

○ 시민공론화위원회 권고사항 통보(시→민간제안자)	:’21. 3.

○ 시민공론화위원회 권고문 통보에 관한 회신(민간제안자→시)	:’21. 4.

○ 전주시 도시계획 조례 개정	:’21.11.

○ 사전협상운영지침 수립에 따른 공공기여 관련 전문가 자문	:’22. 3.∼’23. 1.    ○ 공작물축조, 석면해체 및 건축물 해체허가 승인	:’22. 9.∼12.

○ 전주시 도시계획변경 사전협상 운영지침 제정	:’23. 9. 21.

○ 옛 대한방직 부지 협상대상지 선정 신청서 제출(민간제안자→시)	:’23. 9. 22.

○ 옛 대한방직 부지 협상대상지 선정 신청서 보완요청 (시→민간제안자)	:’23. 10. 12.

○ 옛 대한방직 부지 협상대상지 선정 신청서 보완제출 (민간제안자→시)	:’23. 10. 27.

□ 금후계획

○ 옛 대한방직 부지 협상대상지 선정 관련 절차이행

- 관련부서(기관)협의 및 도시계획위원회, 도시건축공동위원회 자문

○ 협상진행 (개발계획, 공공기여 등)

○ 도시계획변경, 건축허가 및 사업추진(협상 완료 시)

자료번호 : 33         작성자 : 재개발재건축과장  국승철 (인)

자 료 명 : 재개발·재건축사업 현황(지구별 작성)

○ 재개발 사업

지구별 (사업명)	사업개요	사업기간	추진상황	금후계획	비고
물왕멀	◦위치: 완산구 중노송동 410번지 일원 (구역면적: 42,824.9㎡) ◦규모: 지하3층/지상23층 (821세대, 아파트 14개동 및 부대복리시설) ◦연면적: 125,141.27㎡	’06.07.25 ∼ ’18.03.12.	’06.07.25.(추진위승인) ’07.07.06.(정비구역지정) ’07.08.29.(조합설립인가) ’09.07.10.(사업시행인가) ’13.10.02.(관리처분인가) ’15.04.22.(착공) ’18.03.12.(준공인가) ’18.04.16.(이전고시) ’18.12.13.(해산신고) ’22.08.16.(청산)	-
바구멀1	◦위치: 완산구 서신동 68번지 일원 (구역면적: 73,170.7㎡) ◦규모: 지하2층/지상20층 (1,390세대,아파트21개동 및 부대복리시설) ◦연면적: 196,999.56㎡	’06.07.25. ∼ ’20.12.01.	’06.07.25.(추진위승인) ’09.05.04.(정비구역지정) ’11.05.26.(조합설립인가) ’12.12.04.(사업시행인가) ’15.12.21.(관리처분인가) ’18.04.19.(착공) ’20.12.01.(준공인가) ’20.12.24.(이전고시)	조합해산
태평1	◦위치: 완산구 태평동 123-19번지 일원 (구역면적: 61,556.4㎡) ◦규모: 지하2층/지상25층 (1,319세대,아파트12개동 및 부대복리시설) ◦연면적: 188,456.95㎡	’06.07.25. ∼ ’22.05.31.	’06.07.25.(추진위승인) ’07.07.06.(정비구역지정) ’08.06.13.(조합설립인가) ’17.01.26.(사업시행인가) ’17.12.05.(관리처분인가) ’19.11.06.(착공) ’22.05.31.(준공인가) ’22.12.09.(이전고시)	조합해산
효 자	◦위치: 완산구 효자동1가 166-1번지 일원 (구역면적: 68,001.9㎡) ◦규모: 지하3층/지상17층 (1,248세대,아파트17개동 및 부대복리시설) ◦연면적: 193,564.47㎡	’07.11.15. ∼ ’22.12.09.	’07.11.15.(추진위승인) ’11.11.22.(정비구역지정) ’15.09.02.(조합설립인가) ’16.12.16.(사업시행인가) ’17.12.05.(관리처분인가) ’19.10.10.(착공) ’22.12.09.(준공인가)	이전고시 및 조합해산
감나무골	◦위치: 완산구 서신동 40-4번지 일원 (구역면적 : 118,444㎡) ◦규모: 지하3층/지상20층 (1,914세대,아파트28개동 및 부대복리시설) ◦연면적: 325,377.28㎡	’06.07.25. ∼	’06.07.25.(추진위승인) ’10.04.30.(정비구역지정) ’11.07.13.(조합설립인가) ’15.05.18.(사업시행인가) ’20.01.13.(관리처분인가)	착공
동양아파트 인근	◦위치: 덕진구 진북동 417-47번지 일원 (구역면적: 37,306.8㎡) ◦규모: 지하2층/지상25층 (656세대,아파트10개동 및 부대복리시설) ◦연면적: 103,250.65㎡	’06.08.01. ∼	’06.08.01.(추진위승인) ’09.05.06.(정비구역지정) ’10.01.26.(조합설립인가) ’18.03.14.(정비계획변경) ’19.11.28.(사업시행인가) ’22.03.02.(관리처분인가)	주민이주, 철거 및 착공
기자촌	◦위치: 완산구 중노송동 395-3번지 일원 (구역면적: 141,684.9㎡) ◦규모: 지하3층/지상14∼25층 (2,225세대,아파트 28개동 및 부대복리시설) ◦연면적: 397,468.01㎡	’06.08.01. ∼	’06.08.01.(추진위승인) ’09.03.11.(정비구역지정) ’11.05.26.(조합설립인가) ’17.08.23.(정비계획변경) ’19.10.16.(사업시행인가) ’21.07.01.(관리처분인가)	주민이주, 철거 및 착공
종광대2	◦위치: 덕진구 인후동1가 171-1번지 일원 (구역면적 : 31,243㎡) ◦규모: 지하3층/지상15층 (530세대, 아파트 7개동 및 부대복리시설) ◦연면적: 90,899.31㎡	’06.08.07. ∼	’06.08.07.(추진위승인) ’09.02.24.(정비구역지정) ’10.07.09.(조합설립인가) ’17.12.28.(정비계획변경) ’19.11.01.(사업시행인가) ’22.12.12.(관리처분인가)	주민이주, 철거 및 착공
하 가	◦위치: 덕진구 덕진동2가 327-1번지 일원 (구역면적: 113,271㎡) ◦규모: 지하4층/지상17층 (1,989세대,아파트27개동 및 부대복리시설) ◦연면적: 345,902.35㎡	’06.07.25. ∼	’06.07.25.(추진위승인) ’19.04.19.(정비구역지정) ’20.06.03.(조합설립인가) ’23.01.20.(사업시행인가)	관리처분 계획인가
병무청	◦위치: 완산구 남노송동 157-1번지 일원 (구역면적: 74,530㎡) ◦규모: 지하3층/지상25층 (1,220세대,아파트16개동 및 부대복리시설)	’06.07.25. ∼	’06.07.25.(추진위승인) ’22.12.08.(정비계획입안제안) ’23.10.10.(도시계획심의)	정비구역 지정고시 및 조합설립 인가
효 동	◦위치: 완산구 효자동1가 198번지 일원 (구역면적: 47,264㎡) ◦규모: 지상25층 이하	’06.07.25. 〜	’06.07.25.(추진위승인)	정비예정구역 해제검토
성황당	◦위치: 덕진구 인후동 1가 157-106 일원 (구역면적: 32,639㎡) ◦규모: 지상15층 이하	’06.08.07. ∼	’06.08.07.(추진위승인)	정비예정구역 해제검토
전라중교 일원	◦위치: 덕진구 덕진동1가 1268-32번지 일원 (구역면적: 122,226㎡) ◦규모: 지하2층/지상17층 (1,937세대,아파트27개동 및 부대복리시설)	’08.04.21. ∼	’08.04.21.(추진위승인) ’18.09.12.(정비계획입안제안) ’23.04.14.(정비구역지정)	조합설립 인가
동부시장 인근	◦위치: 완산구 경원동3가 90-13 일원 (정비구역면적:40,789.9㎡) ◦규모: 지하 2층, 지상10∼20층 (공동주택 8동, 판매시설 3동, 세대수 686세대) 지하2층∼지상6층 (숙박시설 1동, 객실 90실) ◦연면적: 133,768.9㎡	’09.03.20. ∼	’09.03.20.(추진위승인) ’15.04.21.(문화재청심의완료) ’16.07.09.(정비계획입안제안) ’17.12.19.(미지정처분) ’19.03.26.(LH 참여 가로주택 정비사업 주민설명회) ’21.02.04.(LH 건축계획(안) 설계 제안) ’21.05.13.(도시계획조례개정)	정비구역 지정

○ 재건축사업

지구별 (사업명)	사업개요	사업기간	추진상황	금후계획	비고
삼천 주공2	◦위치: 완산구 삼천동1가 585-12번지 (구역면적: 35,280㎡) ◦규모: 지하2층/지상15층 (702세대,아파트 9개동 및 부대복리시설) ◦연면적: 115,885.58㎡	’05.09.30. ∼ ’14.11.27.	’05.09.30.(정비구역지정) ’05.11.01.(추진위승인) ’07.04.18.(조합설립인가) ’08.09.12.(사업시행인가) ’09.09.09.(관리처분인가) ’10.08.10.(착공) ’14.11.27.(준공인가) ’14.12.30.(이전고시)	조합해산
우진 태하	◦위치: 완산구 효자동1가 297번지 일원 (구역면적: 16,512.2㎡) ◦규모: 지하2층/지상22층 (326세대,아파트 6개동 및 부대복리시설) ◦연면적: 45,476.97㎡	’07.01.08 ∼ ’17.08.30.	’07.01.08.(추진위승인) ’11.08.03.(정비구역지정) ’11.12.15.(조합설립인가) ’13.11.15.(사업시행인가) ’14.05.09.(관리처분인가) ’15.03.09.(착공) ’17.08.30.(준공인가) ’17.09.05.(이전고시) ’20.10.15.(해산신고)	조합청산
우아 주공2	◦위치: 덕진구 우아동3가 743-148번지 외 1필지 (구역면적: 35,646㎡) ◦규모: 지하2층/지상23층 (750세대,아파트 10개동 및 부대복리시설) ◦연면적: 111,252㎡	’10.09.14. ∼ ’18.12.27.	’03.07.25.(추진위승인) ’10.09.14.(정비구역지정) ’11.07.27.(조합설립인가) ’15.06.09.(사업시행인가) ’16.04.12.(관리처분인가) ’16.08.08.(착공) ’18.12.27.(준공인가) ’19.01.30.(이전고시) ’20.03.06.(해산신고)	조합청산
우아 주공1	◦위치: 덕진구 우아동3가 747-81번지 외 1필지 (구역면적: 49,115.3㎡) ◦규모: 지하2층/지상25층 (998세대,아파트 11개동 및 부대복리시설) ◦연면적: 147,540.74㎡	’03.11.20. ∼ ’21.08.25.	’03.11.20.(추진위승인) ’03.12.18.(조합설립인가) ’10.09.14.(정비구역지정) ’17.01.05.(사업시행인가) ’18.04.05.(관리처분인가) ’19.04.09.(착공) ’21.08.25.(준공인가) ’21.11.25.(이전고시) ’22.09.20.(해산신고)	조합청산
효자 주공	◦위치: 완산구 효자동1가 133번지 외 27필지 (구역면적: 114,222㎡) ◦규모: 지하3층/지상7~25층 (2,053세대,아파트21개동 및 부대복리시설) ◦연면적: 378,552.52㎡	’06.08.01. ∼	’06.08.01.(추진위승인) ’11.10.06.(정비구역지정) ’13.05.06.(조합설립인가) ’18.11.06.(정비계획변경) ’21.07.26.(정비계획변경) ’23.06.23.(사업시행인가)	관리처분 계획인가
삼천 쌍용	◦위치: 완산구 삼천동1가 585-5번지 일원 (구역면적: 24,746㎡) ◦규모: 지하2층/지상18층 (499세대, 아파트 6개동 및 부대복리시설) ◦연면적: 80,794.43㎡	’06.10.30. ∼ ’23.03.02.	’06.10.30.(추진위승인) ’09.12.29.(정비구역지정) ’12.11.21.(조합설립인가) ’19.05.13.(사업시행인가) ’19.11.12.(관리처분인가) ’20.08.10.(착공) ’23.03.02.(준공인가) ’23.09.21.(이전고시)	조합해산
오성 대우	◦위치: 완산구 삼천동 1가 705번지 (구역면적: 18,667.4㎡) ◦규모: 지하2층/지상25층 (418세대, 아파트 5개동 및 부대복리시설) ◦연면적: 73,611.06㎡	’15.02.27. ∼	’15.02.27.(정비예정구역지정) ’16.06.14.(안전진단) ’17.06.20.(정비구역지정) ’19.09.02.(추진위승인) ’20.09.15.(조합설립인가) ’23.04.07.(사업시행인가)	관리처분 계획인가
삼천 주공3	◦위치: 완산구 삼천동1가 585-4번지 일원 (구역면적: 29,624㎡) ◦규모: 지하2층/지상25층 (602세대, 아파트 6개동 및 부대복리시설) ◦연면적: 98,259.57㎡	’15.02.27. ∼	’15.02.27.(정비예정구역지정) ’16.09.07.(안전진단) ’18.06.07.(정비구역지정) ’18.11.30.(추진위승인) ’19.10.10.(조합설립인가) ’21.12.29.(사업시행인가)	관리처분 계획인가
세경 아파트	◦위치: 완산구 삼천동 1가 585-3번지 (구역면적: 24,182.7㎡) ◦규모: 지하2층/지상23층 (508세대, 아파트 7개동 및 부대복리시설) ◦연면적: 88,237.52㎡	’15.02.27. ∼	’15.02.27.(정비예정구역지정) ’18.03.16.(안전진단) ’19.12.10.(정비구역지정) ’20.03.13.(추진위승인) ’21.04.16.(조합설립인가) ’23.08.21.(사업시행인가신청)	사업시행 계획인가
송천 롯데	◦위치: 덕진구 송천동2가 561-19 (구역면적: 12,850㎡) ◦규모: 지상25층 이하	-	’06.07.14.(정비예정구역지정)	안전진단 요청
세원· 거성	◦위치: 덕진구 덕진동1가 1314-133, 154 (구역면적: 13,117㎡) ◦규모: 지상12층 이하	-	’06.07.14.(정비예정구역지정) ’22.04.27.(안전진단 요청) ’22.05.26.(안전진단 실시결정)	안전진단 의뢰
삼천 쌍용2	◦위치: 완산구 삼천동1가 585-2번지 (구역면적: 17,380㎡) ◦규모: 지상25층 이하	-	’15.02.27.(정비예정구역지정) ’22.04.28.(안전진단 요청) ’22.06.13.(안전진단 실시결정)	안전진단 의뢰
개나리 아파트	◦위치: 완산구 삼천동1가 705-1 (구역면적 : 31,139.2㎡) ◦규모: 지하1층/지상25층 (658세대, 아파트 7개동 및 부대복리시설) ◦연면적: 98,001.44㎡	-	’15.02.27.(정비예정구역지정) ’23.01.20.(안전진단) ’23.04.20.(정비구역지정 입안제안신청)	정비구역 지정
송천 무지개	◦위치: 덕진구 송천동1가 543-67 (구역면적 : 18,394㎡) ◦규모: 지상25층 이하	-	’15.02.27.(정비예정구역지정) ’23.03.29.(안전진단 요청) ’23.05.04.(안전진단 실시결정) ’23.09.01.(안전진단 의뢰)	안전진단 완료 및 재건축 여부 결정

자료번호 : 34         작성자 : 재개발재건축과장  국승철 (인)

자 료 명 : 소규모 주택정비사업 추진

위 치 (사업명)	사업개요	진행상황	비 고
유창아파트 가로주택정비사업	◦사업시행구역면적 : 6,780㎡ ◦층수 : 지하3층/지상29층 ◦예상세대수 : 아파트272/오피스텔54	조합설립인가
풍년주택 가로주택정비사업	◦사업시행구역면적 : 9,996㎡ ◦층수 : 지하1층/지상7층 ◦예상세대수 : 아파트182	조합설립인가
서신동 295-76번지 일원 가로주택정비사업	◦사업시행구역면적 : 6,335.7㎡ ◦층수 : 지하1층/지상20층 ◦예상세대수 : 아파트170/오피스텔105	조합설립인가
동화아파트 가로주택정비사업	◦사업시행구역면적 : 7,833.7㎡ ◦층수 : 지하1층/지상15층 ◦예상세대수 : 아파트152	검인동의서 연번부여
남향연립 가로주택정비사업	◦사업시행구역면적 : 4,381㎡ ◦층수 : 지하1층/지상10층 ◦예상세대수 : 아파트112	검인동의서 연번부여
삼진연립 가로주택정비사업	◦사업시행구역면적 : 8,541㎡ ◦층수 : 지하1층/지상15층 ◦예상세대수 : 아파트168	검인동의서 연번부여
서부거성 가로주택정비사업	◦사업시행구역면적 : 9,190㎡ ◦층수 : 지하3층/지상15층 ◦예상세대수 : 아파트172	통합심의
서신동 295-45번지 일원 가로주택정비사업	◦사업시행구역면적 : 6,038㎡ ◦층수 : 지하4층/지상20층 ◦예상세대수 : 아파트202	조합설립인가
효동2길33-138 일원 가로주택정비사업	◦사업시행구역면적 : 7,225.58㎡ ◦층수 : 지하2층/지상15층 ◦예상세대수 : 아파트149	검인동의서 연번부여 (사업중단)
금암동 708-3번지 일원 가로주택정비사업	◦사업시행구역면적 : 6,955.2㎡ ◦층수 : 지하3층/지상39층 ◦예상세대수 : 아파트213/오피스텔48	통합심의
태평동 가로주택정비사업	◦사업시행구역면적 : 7,671㎡ ◦층수 : 지하2층/지상25층 ◦예상세대수 : 아파트230/오피스텔46	조합설립인가
덕진삼화 가로주택정비사업	◦사업시행구역면적 : 4,591㎡ ◦층수 : 지하1층/지상22층 ◦예상세대수 : 아파트176	검인동의서 연번부여
동남수정 가로주택정비사업	◦사업시행구역면적 : 7,516.55㎡ ◦층수 : 지하2층/지상15층 ◦예상세대수 : 아파트153	검인동의서 연번부여
전원연립 가로주택정비사업	◦사업시행구역면적 : 2,468.3㎡ ◦층수 : 지하2층/지상21층 ◦예상세대수 : 아파트99	조합설립인가
서완산동2가 341-24번지 일원 가로주택정비사업	◦사업시행구역면적 : 9,713.3㎡ ◦층수 : 지하2층/지상13층 ◦예상세대수 : 아파트181	검인동의서 연번부여
금암동 710-9번지 일원 가로주택정비사업	◦사업시행구역면적 : 3,212.8㎡ ◦층수 : 지하2층/지상20층 ◦예상세대수 : 아파트120	검인동의서 연번부여
우아동3가 726-1번지 일원 가로주택정비사업	◦사업시행구역면적 : 8,043.6㎡ ◦층수 : 지하2층/지상12층 ◦예상세대수 : 아파트140	조합설립인가
우아동3가 730-1번지 일원 가로주택정비사업	◦사업시행구역면적 : 6,335.1㎡ ◦층수 : 지하2층/지상12층 ◦예상세대수 : 아파트121	조합설립인가
우아동3가 727-1번지 일원 가로주택정비사업	◦사업시행구역면적 : 6,119.9㎡ ◦층수 : 지하2층/지상12층 ◦예상세대수 : 아파트117	검인동의서 연번부여
우아동3가 728-1번지 일원 가로주택정비사업	◦사업시행구역면적 : 6,262.1㎡ ◦층수 : 지하2층/지상12층 ◦예상세대수 : 아파트120	조합설립인가
금암동 715-6번지 일원 가로주택정비사업	◦사업시행구역면적 : 3,681.7㎡ ◦층수 : 지하3층/지상24층 ◦예상세대수 : 아파트176	검인동의서 연번부여
우아동3가 403-2번지 일원 가로주택정비사업	◦사업시행구역면적 : 6,908㎡ ◦층수 : 지하2층/지상12층 ◦예상세대수 : 아파트149	검인동의서 연번부여
인후동 가로주택정비사업	◦사업시행구역면적 : 8,684.98㎡ ◦층수 : 지하2층/지상27층 ◦예상세대수 : 아파트229/오피스텔34	검인동의서 연번부여
금암동 453-15번지 일원 가로주택정비사업	◦사업시행구역면적 : 5,281㎡ ◦층수 : 지하3층/지상29층 ◦예상세대수 : 아파트205/오피스텔47	사업시행자 지정
우아동3가 727-2번지 일원 가로주택정비사업	◦사업시행구역면적 : 3,820.4㎡ ◦층수 : 지하2층/지상12층 ◦예상세대수 : 아파트76	검인동의서 연번부여
금암동 457-15번지 일원 가로주택정비사업	◦사업시행구역면적 : 5,899.70㎡ ◦층수 : 지하3층/지상29층 ◦예상세대수 : 아파트222/오피스텔42	사업시행자 지정 동의서 검인
인후동1가 470-9번지 일원 가로주택정비사업	◦사업시행구역면적 : 5,334㎡ ◦층수 : 지하3층/지상29층 ◦예상세대수 : 아파트193/오피스텔27	검인동의서 연번부여
서완산동2가 334-17번지 일원 가로주택정비사업	◦사업시행구역면적 : 9,932㎡ ◦층수 : 지하1층/지상10층 ◦예상세대수 : 아파트190	검인동의서 연번부여
서완산동2가 341-58번지 일원 가로주택정비사업	◦사업시행구역면적 : 9,720㎡ ◦층수 : 지하2층/지상20층 ◦예상세대수 : 아파트174	검인동의서 연번부여
덕진동2가 27번지 일원 가로주택정비사업	◦사업시행구역면적 : 9,760㎡ ◦층수 : 지하2층/지상20층 ◦예상세대수 : 아파트239	검인동의서 연번부여
진북동 322-166번지 일원 가로주택정비사업	◦사업시행구역면적 : 9,987㎡ ◦층수 : 지하1층/지상20층 ◦예상세대수 : 아파트200	검인동의서 연번부여
덕진동2가 20번지 일원 가로주택정비사업	◦사업시행구역면적 : 9,998㎡ ◦층수 : 지하1층/지상19층 ◦예상세대수 : 아파트226	검인동의서 연번부여
현대아파트 소규모재건축사업	◦사업시행구역면적 : 4,565㎡ ◦층수 : 지하2층/지상12∼13층 ◦예상세대수 : 아파트145	사업시행계획 인가
남양송정 소규모재건축사업	◦사업시행구역면적 : 9,355㎡ ◦층수 : 지하3층/지상27층 ◦예상세대수 : 아파트195	통합심의
동원맨션 소규모재건축사업	◦사업시행구역면적 : 8,747㎡ ◦층수 : 지하1층/지상25층 ◦예상세대수 : 아파트189	건축심의
거성국민주택 소규모재건축사업	◦사업시행구역면적 : 4,582㎡ ◦층수 : 지하1층/지상15층 ◦예상세대수 : 아파트109	건축심의
남향주택 소규모재건축사업	◦사업시행구역면적 : 3,545㎡ ◦층수 : 지하1층/지상9층 ◦예상세대수 : 아파트90	검인동의서 연번부여
거성덕진빌라 소규모재건축사업	◦사업시행구역면적 : 8,495㎡ ◦층수 : 지하2층/지상11∼17층 ◦예상세대수 : 아파트177	검인동의서 연번부여
세일아파트 소규모재건축사업	◦사업시행구역면적 : 2,241.5㎡ ◦층수 : 지상9층 ◦예상세대수 : 아파트64	검인동의서 연번부여
한양아파트 소규모재건축사업	◦사업시행구역면적 : 1,545.4㎡ ◦층수 : 지하1층/지상8층 ◦예상세대수 : 아파트49	검인동의서 연번부여
남양장미 소규모재건축사업	◦사업시행구역면적 : 8,404㎡ ◦층수 : 지하2층/지상29층 ◦예상세대수 : 아파트173	검인동의서 연번부여
대우청솔 소규모재건축사업	◦사업시행구역면적 : 5,135㎡ ◦층수 : 지하2층/지상24층 ◦예상세대수 : 아파트96	검인동의서 연번부여
남양효자 소규모재건축사업	◦사업시행구역면적 : 7,132㎡ ◦층수 : 지하1층/지상22층 ◦예상세대수 : 아파트133	검인동의서 연번부여
거성·거성국민 소규모재건축사업	◦사업시행구역면적 : 9,131㎡ ◦층수 : 지하2층/지상14층 ◦예상세대수 : 아파트168	검인동의서 연번부여
풍년연립 소규모재건축사업	◦사업시행구역면적 : 3,555㎡ ◦층수 : 지하1층/지상15층 ◦예상세대수 : 아파트58	조합설립인가
부광·한성 소규모재건축사업	◦사업시행구역면적 : 9,118㎡ ◦층수 : 지하2층/지상15층 ◦예상세대수 : 아파트165	검인동의서 연번부여
거성대학촌 소규모재건축사업	◦사업시행구역면적 : 3,599.1㎡ ◦층수 : 지하3층/지상21층 ◦예상세대수 : 아파트200	검인동의서 연번부여
은마아파트 소규모재건축사업	◦사업시행구역면적 : 4,697.31㎡ ◦층수 : 지하2층/지상15층 ◦예상세대수 : 아파트107	검인동의서 연번부여
동남유정아파트 소규모재건축사업	◦사업시행구역면적 : 4,639㎡ ◦층수 : 지하4층/지상32층 ◦예상세대수 : 아파트148/오피스텔29	검인동의서 연번부여
인후삼화 소규모재건축사업	◦사업시행구역면적 : 1,695㎡ ◦층수 : 지하2층/지상23층 ◦예상세대수 : 아파트66/오피스텔22	검인동의서 연번부여

자료번호 : 35         작성자 : 재개발재건축과장  국승철 (인)

자 료 명 : 지역주택조합 주택건설사업 추진

위 치 (사업명)	사업개요	진행상황	비 고
다가동 지역주택조합	◦위치 : 완산구 다가동2가 116-1번지 일원 ◦규모 : 대지면적8,456.57㎡/연면적58,209㎡ /지하3층,지상29층 ◦예상세대수 : 아파트308/오피스텔50 ◦조합원수 : 176	조합설립인가 (사업중단)
효자동 지역주택조합	◦위치 : 완산구 효자동3가 37-1번지 일원 ◦규모 : 대지면적12,051㎡/연면적54,029㎡ /지하3층,지상27층 ◦예상세대수 : 아파트353 ◦조합원수 : 208	통합심의
효자동금솔 지역주택조합	◦위치 : 완산구 삼천동1가 138-6번지 일원 ◦규모 : 대지면적36,447㎡/연면적137,771.67㎡ /지하4층,지상25층 ◦예상세대수 : 아파트815 ◦조합원수 : 523	통합심의
(가칭)평화삼천 지역주택조합	◦위치 : 완산구 평화동2가 604-17번지 일원 ◦규모 : 대지면적13,632.6㎡/연면적42,226.26㎡ /지하2층,지상29층 ◦예상세대수 : 아파트271 ◦조합원수 : 187(예정)	모집신고
(가칭)전주상산효자 지역주택조합	◦위치 : 완산구 효자동1가 444번지 일원 ◦규모 : 대지면적8,280㎡/연면적57,410.12㎡ /지하2층,지상43층 ◦예상세대수 : 아파트303/오피스텔50 ◦예정조합원수 : 212(예정)	모집신고
(가칭)용머리강당길 지역주택조합	◦위치 : 완산구 서완산동2가 80-135번지 일원 ◦규모 : 대지면적 14,678.0㎡/연면적 40,687.13㎡ /지하2층,지상10층 ◦예상세대수 : 아파트236 ◦조합원수 : 140(예정)	모집신고
(가칭)용머리강당길(2) 지역주택조합	◦위치 : 완산구 서완산동2가 78-13번지 일원 ◦규모 : 대지면적 13,956.3㎡/연면적 38,037.44㎡ /지하2층,지상10층 ◦예상세대수 : 아파트213 ◦조합원수 : 130(예정)	모집신고
(가칭)진북동재개발 지역주택조합	◦위치 : 덕진구 진북동 322-312번지 일원 ◦규모 : 대지면적 29,519.90㎡/연면적 98,073.60㎡ /지하2층,지상29층 ◦예상세대수 : 아파트633 ◦조합원수 : 437(예정)	모집신고

자료번호 : 36         작성자 : 재개발재건축과장  국승철 (인)

자 료 명 : 주택건설 통합심의 공동위원회 운영결과

일 시	심 의 안 건	심 의 내 용	처 리 결 과
’22.12.22. (제3차)	효자동 서부거성아파트 일원 가로주택정비사업	◦위 치 : 완산구 효자동1가 205-13번지 일원 ◦규 모 : 지하3/지상15층, 172세대 ◦심의사항 : 도시계획, 건축, 경관	조건부 의결
’23.04.19. (제1차)	효자동 지역주택조합 아파트 신축공사	◦위 치 : 완산구 효자동3가 37-1 일원 ◦규 모 : 지하3/지상27층, 353세대 ◦심의사항 : 도시계획, 건축, 경관	조건부 의결
	금암동 708-3 일원 가로주택정비사업	◦위 치 : 덕진구 금암동 708-3 일원 ◦규 모 : 지하3/지상39층, 아파트 213세대, 오피스텔 48호 ◦심의사항 : 건축, 경관, 교통	조건부 의결
’23.08.30. (제2차)	효자동금솔 지역주택조합 공동주택 신축공사	◦위 치 : 완산구 삼천동1가 138-6 일원 ◦규 모 : 지하4/지상25층, 815세대 ◦심의사항 : 도시계획, 건축, 경관, 교통	조건부 의결
’23.10.11. (제3차)	중화산동1가 산28-3번지 일원 주택건설사업	◦위 치 : 완산구 중화산동1가 산28-3 일원 ◦규 모 : 지하1/지상10~15층, 157세대 ◦심의사항 : 도시계획, 건축, 경관	재심의 의결

자료번호 : 37         작성자 : 재개발재건축과장  국승철 (인)

자 료 명 : 노후 공동주택 관리비용 지원사업

(단위:천원)

연번	단지명	지원금액	지급일	사업내용	비고
계				총 68 단지 (시설물 12, 휴게시설 설치 5, 환경개선 51)
1	선변 평화고을@	22,399	’23.08.18.	옥상 및 콘크리트 방수공사 및 상수도설비교체
2	거성근영1차	21,000	’23.08.31.	승강기 로프, 시브 교체
3	명륜연립주택	13,520	’23.05.24.	페인트 도장 공사
4	송원 1차@	26,460	’23.09.08.	아파트 노후 울타리 교체공사
5	삼천쌍용 2단지	15,146	추진중	옥상방수, 계단보수, 단지내 아스콘보수
6	서신우신 1단지	5,000	추진중	쓰레기장 비가림시설 설치
7	풍년@	30,000	’23.06.12.	옥상지붕공사
8	천일강변@	30,000	’23.10.10.	승강기 교체공사
9	아중롯데@	30,000	추진중	지하주차장 페인트 도색공사
10	송천현대 3차@	30,000	’23.07.17.	지하 오배수관 부분교체공사
11	남향주택	27,258	’23.06.16.	외부담장 철거 후 휀스 공사
12	아중아남@	30,000	추진중	지하주차장 캐노피 설치공사
13	서신우신 1단지	22,000	추진중	근로자 휴게시설 설치(쉼터 설치)
14	두산푸른솔@	30,000	추진중	근로자 휴게시설 설치(경비원 휴게시설 조성)
15	KJ라미안@	29,920	추진중	근로자 휴게시설 설치(샷시 설치, 단열 도배 등)
16	한양운남맨션	25,361	’23.06.14.	근로자 휴게시설 설치
17	산내들@	29,997	’23.07.18.	근로자 휴게시설 설치
18	서서학대명@	4,920	’23.05.04.	근로자 휴게시설 시설개선 및 비품 구입·교체
19	개나리1차@	3,200	’23.05.11.	근로자 휴게시설 시설개선 및 비품 구입·교체
20	삼천쌍용 2단지	4,066	’23.05.24.	근로자 휴게시설 시설개선 및 비품 구입·교체
21	삼성효자타운	5,000	’23.07.11.	근로자 휴게시설 시설개선 및 비품 구입·교체
22	선변서신고을@	5,000	’23.08.03.	근로자 휴게시설 시설개선 및 비품 구입·교체
23	효자금호타운 (금호@)	4,930	추진중	근로자 휴게시설 시설개선
24	평화현대@	5,000	추진중	근로자 휴게시설 시설개선 및 비품 구입·교체
25	거성화산@	4,344	’23.05.31.	근로자 휴게시설 시설개선 및 비품 구입·교체
26	서신엘지@	5,000	’23.07.19.	근로자 휴게시설 시설개선
27	금호청솔@	5,000	’23.09.10.	근로자 휴게시설 시설개선 및 비품 구입·교체
28	평화호반 리젠시빌@	4,985	’23.05.31.	근로자 휴게시설 시설개선 및 비품 구입·교체
29	서신2차 동아@	5,000	’23.09.08.	근로자 휴게시설 시설개선
30	광진궁전@	4,630	추진중	근로자 휴게시설 시설개선 및 비품 구입·교체
31	거성그린맨션	5,000	’23.07.26.	근로자 휴게시설 시설개선
32	흥건삼천1차	5,000	추진중	근로자 휴게시설 시설개선 및 비품 구입·교체
33	흥건삼천2차	5,000	추진중	근로자 휴게시설 시설개선 및 비품 구입·교체
34	효자2차 수목토@	5,000	’23.10.05.	근로자 휴게시설 시설개선 및 비품 구입·교체
35	코오롱 하늘채@	5,000	’23.07.04.	근로자 휴게시설 시설개선 및 비품 구입·교체
36	더샵효자 2차@	5,000	추진중	근로자 휴게시설 시설개선 및 비품 구입·교체
37	더샵효자@	5,000	’23.08.03.	근로자 휴게시설 시설개선 및 비품 구입·교체
38	골든팰리스 휴먼시아@	4,994	’23.05.16.	근로자 휴게시설 시설개선 및 비품 구입·교체
39	태평에스케이뷰@	4,955	추진중	근로자 휴게시설 시설개선
40	거성근영2차	4,480	’23.06.22.	근로자 휴게시설 비품 구입 · 교체
41	거산황궁맨션	5,000	’23.05.26.	근로자 휴게시설 비품 구입 · 교체
42	삼천우성	4,368	’23.07.19.	근로자 휴게시설 비품 구입 · 교체
43	동도미소드림@	4,955	’23.10.06.	근로자 휴게시설 비품 구입 · 교체
44	호반 베르디움@	5,000	’23.06.08.	근로자 휴게시설 비품 구입 · 교체
45	평화영무예다음@	5,000	’23.06.09.	근로자 휴게시설 비품 구입 · 교체
46	효자풍림아이원@	5,000	’23.05.22.	근로자 휴게시설 비품 구입 · 교체
47	현대에코르@	5,000	추진중	근로자 휴게시설 비품 구입 · 교체
48	서부신시가지 아이파크	5,000	’23.05.16.	근로자 휴게시설 비품 구입 · 교체
49	라이프아파트	3,883	’23.08.16.	근로자 휴게시설 시설개선 및 비품 구입·교체
50	우아진흥하이츠@	5,000	’23.06.07.	근로자 휴게시설 시설개선 및 비품 구입·교체
51	동진@	5,000	추진중	근로자 휴게시설 시설개선 및 비품 구입·교체
52	호성 동신1,2차@	5,000	’23.10.18.	근로자 휴게시설 시설개선
53	송천우림@	4,972	’23.04.11.	근로자 휴게시설 시설개선 및 비품 구입·교체
54	반월삼오@	4,961	’23.06.02.	근로자 휴게시설 시설개선
55	여의동동국@	5,000	’23.06.26.	근로자 휴게시설 시설개선 및 비품 구입·교체
56	여의동제일@	5,000	’23.08.14.	근로자 휴게시설 시설개선
57	거성 고속2차@	5,000	’23.04.10.	근로자 휴게시설 시설개선 및 비품 구입·교체
58	송천신일@	5,000	’23.06.22.	근로자 휴게시설 시설개선
59	송천쌍용2단지@	5,000	’23.06.09.	근로자 휴게시설 시설개선
60	선변오지오@	4,396	’23.04.18.	근로자 휴게시설 시설개선 및 비품 구입·교체
61	진버들 대우2차@	5,000	추진중	근로자 휴게시설 시설개선
62	인후송정써미트@	5,000	’23.05.19.	근로자 휴게시설 시설개선 및 비품 구입·교체
63	하가휴먼빌@	5,000	’23.08.23.	근로자 휴게시설 시설개선 및 비품 구입·교체
64	호성 동신3차@	4,591	’23.04.27.	근로자 휴게시설 비품 구입 · 교체
65	한양운남맨션	4,638	’23.06.14.	근로자 휴게시설 비품 구입 · 교체
66	송천시영@	3,320	’23.06.02.	근로자 휴게시설 비품 구입 · 교체
67	송천한양@	5,000	’23.06.01.	근로자 휴게시설 비품 구입 · 교체
68	송천센트럴 파크2단지@	4,770	’23.04.27.	근로자 휴게시설 비품 구입 · 교체

자료번호 : 38         작성자 : 재개발재건축과장  국승철 (인)

자 료 명 : 공동주택 주민참여예산 지원사업

(단위:천원)

연번	단지명	지원금액	지급일	사업내용	비 고
계				총 69 단지 (완산 36, 덕진 33)
1	동신1차@	30,000	’23.07.04.	오배수관 수선 공사
2	거성그린맨션@	30,000	추진중	지붕 방수 공사
3	거성근영1차@	30,000	추진중	CCTV 추가설치·교체 및 어린이놀이터 시설 개량
4	석정수팰리스	30,000	’23.09.01.	아파트 외벽 도색
5	광진1차@	30,000	추진중	주차 시설 및 쓰레기 분리수거장 보수 사업
6	대산@	30,000	’23.06.02.	옥상방수공사
7	진흥하이츠	30,000	’23.08.08.	지하주차장 바닥보수 및 트랜치 교체공사
8	송원1차@	30,000	’23.06.22.	옥상방수 공사
9	우정@	30,000	추진중	승강기 교체
10	신세계블루타운	30,000	추진중	내외벽크랙보수 및 재도장
11	대명@	30,000	’23.09.26.	경계 펜스 보강
12	평화2주공3단지	30,000	’23.07.05.	쓰레기 분리수거장 설치공사
13	주공그린1차@	30,000	’23.08.08.	노후CCTV 교체
14	코오롱@	30,000	추진중	옥상자동개폐장치 및 운동기구, 재활용품분리수거함 설치
15	평화주공5단지	30,000	추진중	단지 내 주차장 증설
16	평화현대@	30,000	추진중	CCTV 추가 및 교체, 놀이터보수, 정자보수
17	호반리젠시빌@	30,000	’23.08.14.	아스콘 재포장공사
18	우신@1단지	30,000	추진중	단지 내 아스콘 공사
19	쌍용@	30,000	’23.07.19.	아스콘 공사 및 맨홀 정비
20	현대@	25,000	추진중	승강기 보수공사
21	서신비사벌@	30,000	’23.09.18.	단지내 CCTV 교체 및 증설
22	엘지@	30,000	’23.09.26.	CCTV 및 감시카메라 교체
23	동아2차@	30,000	추진중	쓰레기 분리수거장 설치
24	중흥@	20,000	추진중	관리동 기능보강 공사 (창문 및 출입문 교체, 옥상 방수 공사, LED등 교체, 씽크대 교체)
25	광진선수촌@	30,000	’23.08.03.	아파트 외부 담장 개보수 (철재 펜스 교체 시공)
26	서신선변고을@	15,400	’23.07.06.	지하주차장 LED등 교체
27	금호청솔@	20,000	추진중	주민공동세차장 철거 및 자전거보관대 천막 교체
28	우성그린@	30,000	추진중	옥상방수 및 보수
29	남양@	30,000	’23.06.26.	분리수거장 1개소 신축
30	호반리젠시빌@	30,000	’23.08.14.	휴게시설 파고라 설치
31	삼천주공 4단지	30,000	’23.09.04.	자전거 보관대 교체 등
32	거성소라@	20,000	추진중	노후 지붕 누수공사
33	금호@	20,000	추진중	관리동(노인정, 관리사무소)의 노후 창호 개보수
34	효자성원맨션	30,000	’23.06.02.	아파트 지하주차장 바닥 보수공사
35	현대@	30,000	’23.05.24.	정화조 폐쇄 및 오수관로 공사
36	서곡LG@	30,000	’23.08.18.	공동주택 수목 절지 및 산책로 정비
37	기린@	15,000	추진중	아파트 외벽 도색 및 보수 공사
38	남향맨션	30,000	추진중	운동기구 설치
39	현대2단지@	30,000	추진중	변압기 승압 교체 공사
40	인후송정써미트	30,000	’23.08.02.	아파트 지하주차장 지붕 설치
41	효성@	10,000	’23.07.18.	건물외벽 도색
42	미도@	30,000	’23.10.06.	주차장 재포장(아스콘포장)
43	아중제일1차	24,000	’23.08.21.	분리수거장 설치, 어린이놀이터 및 관리소 캐노피 설치
44	거성타워@	30,000	’23.10.13.	단지 내 주차장 아스콘 포장
45	동남국민@	30,000	’23.05.30.	단지 내 도로(주차장) 아스콘 포장 및 경계석 보수 등
46	중앙하이츠@	30,000	’23.09.01.	정자 1개동 설치
47	거성광장@	30,000	’23.10.05.	아파트 담장 보수 및 도색
48	거성대학촌@	18,000	’23.08.29.	아파트 담장 보수 및 도색
49	삼화연립	15,000	추진중	연립 담장 보수 및 도색
50	우림연립주택	30,000	’23.08.21.	옥상 방수 및 보수 공사
51	송천시영@	30,000	추진중	재활용쓰레기분리수거장 설치
52	비사벌@	30,000	’23.04.28.	비사벌 아파트 15동 옥상방수공사
53	신동아1차@	30,000	추진중	아파트 옥상 방수 공사
54	호성 우신@	30,000	’23.06.29.	아파트 외벽 도색 공사
55	호성 동신3차@	30,000	’23.07.03.	입구 아스콘 재포장,현관출입구 자동문 교체
56	태성연립	30,000	’23.06.09.	외벽계단방수공사
57	삼흥연립	20,000	’23.06.21.	외벽 재도장 공사
58	서호@	30,000	’23.06.22.	외벽 및 지하주차장 바닥 공사
59	신동비사벌3차	30,000	추진중	승강기 교체 공사 등
60	우림@	30,000	’23.07.21.	지하주차장 시설 보수 공사
61	송천뜨란채	20,000	’23.06.09.	관리동 화장실 리모델링 공사
62	신동비사벌2단지	30,000	추진중	건물 외벽 재포장 공사
63	현대2차@	10,000	’23.08.16.	정·후문 차단기 설치공사
64	현대4차@	30,000	’23.06.21.	승강기 교체 공사
65	팔학골영창@	30,000	추진중	건물외벽 재포장 공사
66	현대1차@	30,000	추진중	건물외벽 재포장 공사
67	남양반월타운	30,000	추진중	아파트 내부 도색작업
68	우신@	30,000	’23.05.12.	옥상 방수공사
69	대승@	30,000	’23.07.26.	LED등 설치공사

자료번호 : 39         작성자 : 재개발재건축과장  국승철 (인)

자 료 명 : 소규모 공동주택 생활환경개선 지원사업

(단위:천원)

연번	단지명	주소	점검비용	사업내용	비 고
계				총 69 단지 (완산 14, 덕진 55)
1	명륜연립	동완산동 304-28 (완산4길 30-27)	5,852	소규모 공동주택 안전점검
2	부광연립	효자동1가 325 (백제대로 165-24)	8,200	소규모 공동주택 안전점검
3	삼화연립 (A,B,C동)	여의동2가 658-117 (쪽구름5길 47-9)	3,617	소규모 공동주택 안전점검
4	비사벌연립	금암동 751-6 (떡전3길 17)	4,087	소규모 공동주택 안전점검
5	풍년@	덕진동1가 1118-3 (떡전로 21)	3,695	소규모 공동주택 안전점검
6	풍년연립	덕진동1가 1122-3 (떡전1길 5)	3,539	소규모 공동주택 안전점검
7	에덴 연립주택	금암동 1601-9 (매봉5길 24)	3,460	소규모 공동주택 안전점검
8	삼부연립 주택(A동)	우아동3가 451 (안덕원1길 47)	3,382	소규모 공동주택 안전점검
9	삼화연립 (가동)주택	덕진동1가 1314-155 (덕진광장로 18)	4,008	소규모 공동주택 안전점검
10	덕원주택	덕진동1가 1314-123 (덕진연못2길 9-4)	3,539	소규모 공동주택 안전점검
11	삼흥연립	송천동2가 199-16 (붓내2길 29-3)	3,382	소규모 공동주택 안전점검
12	남향연립 (C동)주택	인후동1가 463 (진버들1길 10)	3,539	소규모 공동주택 안전점검
13	삼화연립 (A동)	팔복동2가 68-8 (추천로 119)	3,460	소규모 공동주택 안전점검
14	동성연립	금암동 1586-7 (매봉1길 12)	3,382	소규모 공동주택 안전점검
15	부익주택	인후동1가 226-5 (인후6길 10)	3,930	소규모 공동주택 안전점검
16	인후연립 주택	인후동1가 394-11 (동가재미2길 36)	3,539	소규모 공동주택 안전점검
17	반촌맨션	진북동 322-320 (반촌로 27)	6,165	소규모 공동주택 안전점검
18	미도빌라	우아동3가 461-2 (도당산로 38)	3,695	소규모 공동주택 안전점검
19	삼진연립 주택	송천동1가 424-3 (송천로 55)	3,930	소규모 공동주택 안전점검
20	동남국민 주택	금암동 1601-10 (매봉5길 26)	3,460	소규모 공동주택 안전점검
21	중앙주택	인후동2가 1563-1 (백동1길 32)	3,774	소규모 공동주택 안전점검
22	진영연립 주택	인후동1가 145-2 (견훤로 167-7)	3,539	소규모 공동주택 안전점검
23	금암동공영	금암동 1601-11 (매봉7길 27)	3,617	소규모 공동주택 안전점검
24	상대@	인후동1가 761-2 (안골3길 20-7)	4,165	소규모 공동주택 안전점검
25	거북연립	금암동 752-3 (떡전4길 19)	4,087	소규모 공동주택 안전점검
26	모란연립 (가~다동)	평화동1가 434-50 (장승배기로 276)	3,678	소규모 공동주택 안전점검
27	-	금암동 1553-23 (금암3길 4)	3,304	소규모 공동주택 안전점검
28	연립주택	진북동 417-127 (진북3길 15)	3,304	소규모 공동주택 안전점검
29	동화아파트 (A,B동)	금암동 525-7 (거북바우3길 24)	7,783	소규모 공동주택 안전점검
30	연립주택	인후동2가 232-86 (작은모래내2길 9-6)	3,051	소규모 공동주택 안전점검
31	금암상가 맨션	금암동 765-1 (용산1길 12)	6,374	소규모 공동주택 안전점검
32	예그린맨션	서서학동 366-1 (장승배기8길 8)	7,600	소규모 공동주택 안전점검
33	거성연립	동완산동 375-1 (완산5길 52)	3,521	소규모 공동주택 안전점검
34	금암맨션	금암동 1561-9 (매봉12길 17-12)	3,051	소규모 공동주택 안전점검
35	영생연립 (가,나동)	남노송동 63-3 (간납로 60)	3,460	소규모 공동주택 안전점검
36	팔복연립	팔복동1가 133-24 (신복3길 15)	6,165	소규모 공동주택 안전점검
37	삼부주택 (가,나)	우아동3가 449-3 (안덕원1길 45)	3,695	소규모 공동주택 안전점검
38	동부시장	경원동3가 90-13 (충경로 109)	5,626	소규모 공동주택 안전점검
39	동산연립	여의동2가 574-1 (편운로 29-2)	4,165	소규모 공동주택 안전점검
40	삼일연립 (가~다동)	금암동 1551-1 (금암3길 40)	4,417	소규모 공동주택 안전점검
41	무지개	금암동 1546-6 (삼송5길 14-22)	3,304	소규모 공동주택 안전점검
42	연립주택 (가,나동)	진북동 906-1 (도토리골2길 10-18)	3,051	소규모 공동주택 안전점검
43	장미연립	효자동2가 1117-68 (거마평로 229)	3,617	소규모 공동주택 안전점검
44	대성연립 (가,나동)	금암동 1583-5 (매봉로 29)	5,617	소규모 공동주택 안전점검
45	인후융성 연립(가동)	인후동2가 1555-10 (명주4길 14)	3,304	소규모 공동주택 안전점검
46	인후융성 연립(나동)	인후동2가 1553-3 (명주4길 16)	3,304	소규모 공동주택 안전점검
47	한우연립	서신동 295-4 (백제대로 381)	3,460	소규모 공동주택 안전점검
48	동남목련 연립(A,B동)	금암동 632-83, 631-232(삼송3길 41)	5,852	소규모 공동주택 안전점검
49	남양연립	효자동1가 324-29 (오두정길 31)	4,165	소규모 공동주택 안전점검
50	삼원연립 (A,B동)	서완산동2가 산100-1 (따박골7길 12-19)	3,617	소규모 공동주택 안전점검
51	삼화연립	진북동 346-7 (건산3길 20)	3,852	소규모 공동주택 안전점검
52	태성연립	송천동1가 137-71 (솔내8길 40-5)	7,209	소규모 공동주택 안전점검
53	동남장미@	금암동 1599-6 (매봉5길 23)	6,714	소규모 공동주택 안전점검
54	세강연립 (A,B동)	효자동1가 358-13 (서원로 202)	3,617	소규모 공동주택 안전점검
55	세원주택	금암동 1563-21 (매봉14길 24)	3,617	소규모 공동주택 안전점검
56	대성@	금암동 1547-6 (조경단로 101)	3,539	소규모 공동주택 안전점검
57	연립주택	인후동1가 696-35 (반태산6길 31-10)	3,304	소규모 공동주택 안전점검
58	협동연립	효자동1가 106-4 (효동3길 8-3)	6,721	소규모 공동주택 안전점검
59	삼화주택 (나동)	덕진동1가 1314-202 (명륜5길 15-4)	3,774	소규모 공동주택 안전점검
60	미성@	금암동 710-9 (기린대로 410-5)	4,756	소규모 공동주택 안전점검
61	금암거성	금암동 526-15 (거북바우3길 14)	4,504	소규모 공동주택 안전점검
62	남양맨션	인후동2가 1528-1 (견훤왕궁로 282)	5,460	소규모 공동주택 안전점검
63	비사벌(10동)	송천동1가 468-2 (송천2길 10)	3,852	소규모 공동주택 안전점검
64	삼화@	인후동2가 1556-2 (명주5길 10)	4,087	소규모 공동주택 안전점검
65	명성연립 주택	팔복동2가 174-2 (팔복2길 3)	3,774	소규모 공동주택 안전점검
66	남향주택 (가,나동)	인후동1가 493-4 (안덕원로 280)	5,539	소규모 공동주택 안전점검
67	효성연립 (가,나동)	효자동1가 381-4 (거마평로 186)	5,695	소규모 공동주택 안전점검
68	광복연립	팔복동1가 183-10 (신복2길 30-1)	3,051	소규모 공동주택 안전점검
69	금호연립	금암동 525-153 (거북바우3길 21)	3,304	소규모 공동주택 안전점검

자료번호 : 40               작성자 : 도시개발과장 장재영 (인)

자 료 명 : 전주교도소 이전‧신축사업 및 이주단지 조성사업

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2015. ∼ 2026.(12개년)

○ 위    치 : 완산구 평화동3가 작지마을 일원(현 교도소에서 300m set-back)

○ 사 업 비 : 1,827억원 정도(국비) ※이주대책비 22억 포함

○ 사업규모 : 194천㎡(교정시설 188천㎡, 진입도로 6천㎡)

- 수용인원 1,500명, 건축면적 30,181㎡(26개동), 직원 465명

○ 사업시행 : 법무부(토지 및 지장물 보상업무 : 전주시)

	전주교도소 이주단지 조성 사업 개요
· 사업기간 : 2020년 ~ 2025년(6개년) · 위 치 : 평화동3가 산 11번지 일원(대한장례식장 맞은편) · 총사업비 : 104억원(국비) · 사업규모 : 이주단지 조성 20,107㎡(20가구, 가구당 140평 규모) · 사업시행자 : 법부부(공사 및 보상업무 : 전주시)

□ 추진상황

○ 작지마을 일원 교도소 이전부지 선정(법무부→시)	: ’15.  3.

○ 이전부지 도시관리계획(교정시설) 결정·고시	: ’17. 12.

○ 권익위 ‘작지마을 주민 특별지원’관련 고충민원 조정(안) 권고	: ’19. 10.

① 이주택지(150평/가구) 조성원가의 15% 공급 ② 공동작업장(텃밭 200평/세대) 대부

○ 보상업무 위·수탁 협약 체결(전주교도소↔시)	: ’19. 12.

○ 이주·생계대책 주민협의 및 추진계획 수립	: ’20. 6. ～ ’21. 4.

① 이주택지(140평/가구) 조성원가의 15% 공급 ② 생계용지 총 3,000평 규모 대부 및 수익사업 지원

○ 이전부지 감정평가 실시	: ’21. 4. ～ 5.

- (감정결과) 토지 172천㎡, 지장물 122건 / 보상비 407억원 산정(증 342억)

○ 이전부지 보상협의 통지 및 보상추진(보상률 72.6%)	: ’21. 6. ～

○ 보상비 증가분 총 사업비 변경 협의·승인(기재부)	: ’21. 7. ～ 12.

○ 이주단지 도시관리계획 변경결정(용도지역, 도로) 고시 : ’22. 5.

○ 이주단지 사업계획(대지조성) 부서 협의 및 승인	: ’22. 7. ～ 12.

○ 이전부지 재감정평가	: ’22. 8. / 12.

- (재감정결과) 97필지(99,242㎡) / 202억원→211억원(증 9억원, ↑4.4%)

○ 이주단지 총사업비 변경 협의(기재부)	: ’23. 1. ～

□ 금후계획

○ 이주단지 총 사업비 변경 및 사업 추진	: ’23. 11. ～ ’25.  6.

○ 이전부지 보상협의 추진	: ’23. 11. ～ ’24.  6.

○ 교도소 신축 공사 설계용역 추진(법무부)	: ’23. 11. ～ ’24.  6.

○ 교도소 신축 공사추진(법무부)	: ’24.  7. ～ ’26.  6.

자료번호 : 41               작성자 : 도시개발과장 장재영 (인)

자 료 명 : 에코시티 2단계 조성사업

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2006. ∼ 2024. (1단계 준공 ’17. 6. / 2단계 준공 ’24. 3.)

○ 위    치 : 덕진구 호성동·송천동·전미동 일원

○ 사 업 비 : 3,459억원(민자, 1단계 2,426억원 / 2단계 1,033억원)

○ 사업규모 : 1,988천㎡(계획인구 32,903명 / 13,161세대)

- 1단계 : 1,545천㎡(28,528명/11,411세대), 2단계 : 443천㎡(4,375명/1,750세대)

○ 사업방식 : 혼용방식(1단계 혼용방식, 2단계 수용·사용방식)

○ 추진방식 : 기부 대 양여방식

○ 사업시행 : 전주시장[전주시 & ㈜에코시티]

□ 추진상황

○ 민간사업자 협약체결(전주시↔에코시티)	: ’06. 3.

○ 도시개발구역지정(개발계획 포함) 승인․고시	: ’12. 8.

○ 개발계획(변경) 및 실시계획수립 고시(전체)	: ’14. 2.

○ 공사 착공 및 준공(1단계)	: ’14. 9. ～ ’17. 6.

○ 206·506항공대대 이전(송천동→도도동)	: ’19. 1.

○ 2단계 문화재 발굴조사 및 토양오염 정화사업 시행  : ’19. 3. ～ 12.

○ 2단계 사업 공사 착공(’23.10월말 기준 공정률 80%)	: ’21. 9.

○ 기존 항공대대 부지 양여 완료	: ’22. 12.

○ 2단계 체비지 매각(총 189필지 중 96필지)	: ’23. 5. ～ 10.

□ 금후계획

○ 2단계 체비지 잔여 필지(93필지) 매각 추진	: ’23. 11. ～ ’24. 3.

○ 2단계 부지개발공사 준공	: ’24. 1.

○ 지적공부정리 및 공사완료 공고	: ’24. 3.

자료번호 : 42               작성자 : 도시개발과장 장재영 (인)

자 료 명 : 전주대대 이전사업

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018. ∼ 2026.(9개년)

○ 이전위치 : 전주시 도도동 일원

○ 사 업 비 : 933억원(기부재산 기준)

○ 사업규모 : 313,772㎡(9.5만평)

※ 현 부지면적 : 322,575㎡(9.7만평)[자연녹지 5.5만평, 덕진공원 4.2만평]

○ 주요시설 : 통합생활관, 실내방음사격장, 탄약고, 관사, 식당 등 1식

□ 추진상황

○ 합의각서 체결(국방시설본부 & 전주시)	: ’18. 12.

- (당초) 항공대대 → (변경) 항공대대+전주대대 체결(전주대대 추가)

○ 기본계획 및 기본설계 추진	: ’19. 2. ∼

○ 전략환경영향평가서(초안) 주민설명회*	: ’20. 1. ∼ ’21. 3.

* 익산(’20.5.20. 무산), 김제(’20.5.26, 무산), 완주(’20.5.27, 완료), 전주(’21.3.5. 완료)

○ 국방 군사시설 사업계획(기본계획, 기본설계) 승인(국방부): ’21. 5.

○ 국방 군사시설 실시계획 승인(국방시설본부) 관련 사전절차 이행 : ’21. 10. ∼

- 농지전용 사전협의(농림부, ’21.10.∼), 환경영향평가 협의회 심의(국방시설본부, ’21.12.)

○ 이전부지 보상 추진	: ’23. 8. ∼

- 보상계획 공고(’23.8.28.∼9.11.), 보상협의회 구성 및 운영(’23.10.10)

□ 금후계획

○ 행정절차 이행(실시계획 및 건축승인)	: ∼ ’24. 5.

○ 공사 착공 및 준공	: ’24.  6. ∼ ’26. 11.

○ 전주대대 기부 및 양여 완료	: ’26. 12.

자료번호 : 43               작성자 : 도시개발과장 장재영 (인)

자 료 명 : 천마지구 도시개발사업

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2015. ∼ 2029. (15개년)

○ 위    치 : 덕진구 송천동․호성동 일원

○ 사 업 비 : 2,352억원(민자 1,471억원, 기타 881억원)

○ 사업규모 : 도시개발구역 446천㎡ (전주대대 180천㎡, 전주대대외 266천㎡)

○ 사업방식 : 혼용방식(수용 및 환지방식)

○ 사업시행 : 전주시장(전주시&㈜에코시티) / 전북개발공사

□ 추진상황

○ 개발행위허가 제한지역 지정·고시(제한기간 5년)	: ’15.  7.

○ 민자유치시행 협약 변경(전주시↔민간사업자)	: ’18. 12.

○ 도시개발사업 구역 지정․고시	: ’20.  8.

○ 상호협력 업무협약 체결(전주시↔전북개발공사)	: ’20. 10.

○ 개발계획 수립 용역 착수	: ’21.  3.

○ 개발계획 수립관련 도시계획위원회 심의	: ’22.  7.

○ 개발계획 수립·고시	: ’22.  8.

○ 공동시행 실시협약 체결(전주시↔전북개발공사)	: ’23.  7.

○ 개발계획 수립(변경) 용역 착수	: ’23.  9.

□ 금후계획

○ 개발계획 수립(변경) 고시	: ’24.  6.

○ 실시계획 및 환지계획 작성·고시	: ’24. ～ ’26.

○ 천마지구 도시개발사업 착공 및 준공	: ’27. ～ ’29.

자료번호 : 44               작성자 : 도시개발과장 장재영 (인)

자 료 명 : 전주역세권 복합개발사업

□ 사업개요

○ 사업기간 : ’18. 12. 14.(지구지정) ∼ ’25. 12. 31.

○ 위    치 : 덕진구 산정동, 우아동 3가, 호성동 1가 일원

○ 사업규모 : 1,065천㎡, 계획인구 20,374인, 주택계획 7,834세대

- 민간임대 3,945, 공공임대 1,613, 분양 2,130, 단독 146

○ 시 행 자 : 한국토지주택공사(수용 또는 사용방식)

○ 근 거 법 : 민간임대주택에 관한 특별법(지정권자:국토부장관)

□ 추진상황

○ 역세권 공급촉진지구 지정 제안(LH↔국토부)	: ’18. 3. ～  4.

○ 지구 지정 잠정보류/취소 요청(시→국토부)	: ’18. 10. ～ 11.

○ 사업취소 요청에 대한 회신(국토부→시)	: ’18. 12. 7.

○ 지구 지정 고시(국토부)	: ’18. 12. 14.

○ 지구 지정 해제 요청(시→국토부, LH)	: ’19. 10. ～ ’20. 3.

○ LH 지구계획 승인신청(LH→국토부)	: ’20. 12.

○ 사업추진 중단 요청(시→국토부)	: ’21. 1. 14.

○ 국토부 장관 면담(시장 국토부 방문)	: ’21. 1. 28.

○ 사업 관련 실무 협의(시↔LH)	: ’22. 7. ～ ’23. 11.

- 대규모 개발사업에 따른 교통 문제 개선방안 등

□ 금후계획

○ 사업 계획 변경 협의 추진(시↔LH)	: ’23. 11. ～

자료번호 : 45               작성자 : 도시개발과장 장재영 (인)

자 료 명 : 효천지구 연계도로 확장사업

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2017. ∼ 2025. (9개년)

○ 위    치 : 완산구 삼천동 세내교∼중인나들목 일원(국도 21호선)

○ 사 업 비 : 338억원(1단계 203, 2단계 135)

○ 사업규모 : 도로확장 L=3.4km, B=20～25m

- 1단계 : 해성교차로-중인나들목(L=1.9km, B=20～25m)

- 2단계 : 세내교-삼천교-해성교차로(L=1.5km, B=25m)

□ 추진상황

○ 지방재정 및 투융자사업 심사·의결	: ’16. 10.

○ 도시관리계획(도로 등) 결정(변경)	: ’18. 4.

○ 실시계획 인가 및 보상계획 공고	: ’19. 3.

○ 편입토지 보상 협의 추진(196필지, 147억원)	: ’19. 6. ～

- 1단계 구간 편입토지 보상 완료 (117필지, 81억원)

○ 1단계 구간 공사착공 및 완료	: ’20. 4. ～ ’22. 12.

○ 2단계 구간 편입토지 및 지장물 보상(재감정평가)	: ’23. 2. ～ 9.

- 79필지(66억원) 중 50필지(53억원) 완료 / 보상률 80%

○ 2단계 구간 수용재결 29필지(13억원) 완료	: ’23. 9. ～ 11.

□ 문제점 및 대책

○ 사업비 확보 (물가변동 및 지가상승으로 인한 사업비 증가)

□ 당초 2단계로 추진 예정이었던 사업구간 단계 세분화하여 예산 순차적 투입

□ 금후계획

○ 2단계 구간 보상비 공탁 및 보상 완료	: ’23. 12.

○ 2단계 구간 공사추진 (세내교∼삼천교∼해성교차로)	: ’24. 2. ～ ’25. 12.

- 상습 병목 발생 구간(삼천교∼해성교차로, L=0.65km) 우선 추진

자료번호 : 46              작성자 : 도시정비과장 허갑수 (인)

자 료 명 : 도시재생 뉴딜사업 추진                    (단위:백만원)

사업명	사업내용 (지원사항)	사업기간	예산액	추진실적
서학동 예술마을 도시재생 뉴딜사업	노후주거지 정비 및 공공서비스 기반 구축, 지역자산 활용 매력적인 공간 창출, 주민친화적 마을조성 주민역량강화 및 거버넌스 구축	’18.∼’23.	17,197	·집수리 지원(153가구) ·거점시설 설치(3개소) ·예술테마거리 조성, 근린생활가로 조성, 다양한 골목길정비, 마을정원화 사업 ·cctv 10개소 설치, 주차장 개설, 주민역량강화사업	뉴딜 사업
용머리 여의주마을 도시재생 뉴딜사업	노후주택정비, 거점공간조성,기반시설정비, 주민역량강화 등	’19.∼’23.	7,626	·도시재생 거점시설 조성 및 마중물 단위사업 추진	뉴딜 사업
전주역세권 도시재생 뉴딜사업	역세권 혁신거점조성, 청년기반조성, 상생기반 조성 등	’19.∼’25.	28,750	·10개 마중물 단위사업 추진	뉴딜 사업
인후반촌 도시재생 뉴딜사업	도시재생 거점시설조성, 노후주택정비,기반시설정비, 주민역량강화 등	’21.∼’24.	16,670	·도시재생 거점시설 조성 등 10개 마중물 단위사업 추진 및 주민역량강화 사업	뉴딜 사업
팔복동 빈집밀집 구역 재생사업	빈집밀집구역 거점시설 조성 및 주거환경 개선 등	’21.∼’24.	15,900	·거점시설 조성 및 주거환경 개선 등 주거지 재생사업(빈집특화) 추진 - 건강생활지원센터, 작은도서관,공공임대 주택 등 생활SOC 공급 및 기반시설 정비 - 집수리 및 골목길 정비 등 거주환경 개선, 주민역량 강화, 지역 네트워크 활성화	뉴딜 사업
덕진권역 도시재생 뉴딜사업	메타버스 아이디어 플랫폼 및 사업화 실증단지 조성 등	’22.∼’27.	55,570	· 도시재생활성화계획승인 · 스마트거리조성사업추진 · 도시재생활성화계획변경 수립 용역 추진	뉴딜 사업
도시재생 인정사업 별과함께 다가서당	점단위 인정사업 지역 커뮤니티 역할을 하는 지역 거점시설 신축(지상2층, 522㎡ 신축)	’20.∼’22.	1,700	·실시설계 완료, 공사발주 운영계획 수립 (현공정 80%)	인정 사업
도시재생 인정사업 서로돌봄 플랫폼	주민공유 활동 거점공간 조성 1개동	’20.∼’23.	3,320	·공사 추진중(공정률 85%)	인정 사업

자료번호 : 47              작성자 : 도시정비과장 허갑수 (인)

자 료 명 : 새뜰마을 조성사업 추진                    (단위:백만원)

사업명	사업내용 (지원사항)	사업기간	예산액	추진실적	비 고
도토리골 새뜰마을 조성사업	․ 주민공동이용시설 조성 ․ 노후주택개선사업 ․ 주민역량강화 ․ 공동체 발굴 및 육성 등	’19∼’23	4,286 (국3,000 도386 시900)	절개지 사면안정화 보강공사 완료
남노송동 새뜰마을 조성사업	․ 주민공동이용시설 조성 ․ 노후주택개선사업 ․ 주민역량강화 ․ 공동체 발굴 및 육성 등	’20∼’24	4,157 (국2,910 도374 시 873)	집수리지원(지붕개량포함) 및 인프라 개선 완료
동완산동 새뜰마을 조성사업	․ 주민공동이용시설 조성 ․ 노후주택개선사업 ․ 주민역량강화 ․ 공동체 발굴 및 육성 등	’21∼’24	4,187 (국2,900 도386 시901)	집수리 지원 및 인프라 조성사업 완료	골목길 포장, 석축쌓기, 계단 정비 등
낙수정 새뜰마을 조성사업	․ 주민공동이용시설 조성 ․ 노후주택개선사업 ․ 주민역량강화 ․ 공동체 발굴 및 육성 등	’23.∼’27.	4,257 (국 2,980 도 383 시 894)	마스터플랜 용역 계약 및 추진
견훤왕궁 지구 새뜰마을 조성사업	․ 주민공동텃밭 조성 ․ 노후주택개선사업 ․ 주민역량강화 ․ 공동체 발굴 및 육성 등	’24.∼’28.	2,715 (국 1,900 도 245 시 570)	’24년도 취약지역 생활여건 개조사업(도시) ’23.9. 공모선정

자료번호 : 48              작성자 : 도시정비과장 허갑수 (인)

자 료 명 : 도시재생사업 거점시설물 운영·관리

사업유형	지구명	시설물명	관리단체	시설물기능	비고
중심시가지형	전주역세권	공감치유센터	대자인병원, (사)대자인건강사랑후원회	첫마중길 공감치유센터 (건강생활지원센터), 북카페, 주민쉼터 운영 등
		여행자도서관	도서관산업과	여행자 도서관
		청년창업이음센터	신성장산업과 (정보문화산업진흥원)	전북 VR․AR제작지원센터 ICT 이노베이션 스퀘어 인프라 조성
		전주맛집 창업교육관	사회적경제과	라디오 방송국 온두레 공동체	4층
			첫마중길 마을관리사회적협동조합	맛집이론 및 실습 청년키움식당	1,2,3,5층
			청년정책과	비보이 연습장	지1층
중심시가지형	원도심	한스타일 플랫폼	문화정책과 (사단법인 아이엠)	음악연습공간	지1층
			청년정책과 (청년이음전주)	청년소통공간	1,2층
			전주수공예 사회적협동조합	수공예 전시·체험·판매	2,3층
			청년정책과 (야호교육통합지원센터)	교육공유공간 청소년활동공간	4,5층
		에너지센터	기후변화대응과	시민활동 교류 및 사무공간
		둥근숲	둥근숲사회적협동조합	주민문화공간, 공동작업장, 창업공간
일반근린형	서학동 예술마을	행복플러스센터	-	주민복지
		복합문화공간	-	전시 및 체험
		창작레지던시플라자	-	마을공동작업소
우리동네살리기	용머리	용머리 여의주마을 주민공동이용시설	용머리 여의주마을 마을관리사회적협동조합	마을공동이용시설(마을카페, 사무실, 유기전시실, 미술실, 사진관, 상담센터 등)
		옛이야기 도서관	도서관산업과	도서관
도시재생 인정사업	원도심	별과함께, 다가서당	정보화정책과, 교통안전과	디지털다가서당 및 주차장
새뜰마을	팔복	팔복새뜰 어울마당	-	주민복지	1,2층
			건축과 (해피하우스)	해피하우스 사무실	3층
새뜰마을	승암	승암새뜰 주민공동이용시설	-	주민복지

자료번호 : 49              작성자 : 도시정비과장 허갑수 (인)

자 료 명 : 팔복동 빈집밀집구역 재생사업

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2021. ∼ 2024. (4개년)

○ 사업위치 : 전주시 덕진구 신복6길 24 일원(신복마을)

○ 총사업비 : 15,900백만원(국 9,000, 도 1,500, 시 4,500, 기금 900)

○ 사업내용 : 거점시설 조성 및 주거환경 개선 등 주거지 재생사업(빈집특화) 추진

- 건강생활지원센터, 작은도서관, 공공임대주택 등 생활SOC 공급 및 기반시설 정비

- 집수리 및 골목길 정비 등 거주환경 개선, 주민역량 강화, 지역 네트워크 활성화

□ 추진상황

○ '20년 제3차 도시재생 뉴딜사업 공모 선정             : ’20. 12.

○ 현장지원센터 운영 및 주민역량강화사업 추진(매년 반복)  : ’21. 4. ∼ ’24. 12.

○ 거점시설 부지매입 및 마중물 단위사업별 사업 추진

- 거점시설 토지·지장물 매입 및 철거공사 추진         : ’21. 6. ∼ ’23. 8.

- 그린숲 도서관(작은도서관, 마을회관) 설계용역        : ’21. 7. ∼ ’23. 11.

- 산책길 네트워크(노후도로 및 담장정비) 설계용역      : ’21. 9. ∼ ’22. 12.

- 돌봄방앗간(건강생활지원센터 등) 설계용역            : ’21. 12. ∼ ’23. 12.

○ MBC 빈집살래 시즌3 촬영 및 수다가든 상가 조성 완료  : ’22. 8. ∼ '23. 7.

○ 팔복동 활성화계획 변경 용역 추진                    : ’22. 8. ∼ '23. 12.

※ 2차 활성화계획 변경 고시 완료(’23.7)

○ 그린골목길 골목쉼터(2개소) 조성 완료                 : ’23. 3. ∼ '23. 7.

□ 금후계획

○ 거점시설 조성 및 기반시설 정비 완료           : ∼’24. 12.

- 돌봄방앗간, 그린숲도서관, 마을활력발전소 거점시설 3개소 조성 추진

- 지중화, 도로(환경부 스마트그린도시사업 연계) 등 기반시설 정비 추진

자료번호 : 50              작성자 : 도시정비과장 허갑수 (인)

자 료 명 : 도심빈집정비 주민공간 조성사업

(단위:천원)

지역명	사업예산	집행액	정비 가구 수	정비내역	정비예정 가구 수	비고
합계	220,000	84,213	10		1
진북동			2	텃밭
팔복동			1	주차장
서서학동			1	텃밭
노송동			1	주차장
중앙동			1	주차장
인후1동			1	텃밭
인후3동			1	단순철거		도민제안
조촌동			2	주차장
미 정				추진중	1

자료번호 : 51              작성자 : 도시정비과장 허갑수 (인)

자 료 명 : 노후 시설물 정비를 통한 생활SOC 확충사업

(단위:천원)

연도	위치	사업비	사업내용	추진상황	비고
2022	동완산동 376-1	100,000	빈집 매입	철거 완료, 주차장 조성 예정
2023	금암동 102-158	200,000	빈집매입 후 쌈지공원 조성	철거추진, 쌈지공원 설계추진
	동서학동 103-2	200,000	빈집매입 후 쌈지공원 조성	철거추진, 쌈지공원 설계추진
	인후동1가 255-19	200,000	빈집매입 후 마을회관 조성	조성완료
	서완산동1가 441-2	200,000	빈집매입 후 탄소중립 거점 신축	철거 발주, 신축 실시설계 추진	탄소중립 사업 연계
	진북동 1146-26	200,000	빈집매입 후 주차장 조성	매수협의 추진

해당없는 자료목록

확인자 : 광역도시기반조성실장 김문기 (인)

자료번호	자 료 명	비 고
2	감사지적사항 조치결과
5	예산전용 및 예비비 지출현황
6	특수시책사업 추진현황(본청, 구청)
7	보류 및 취소 예상사업(국, 사업소별 별도 작성)
16	출연금 집행현황
17	출연기관 이사회 명단 및 이사회 개최현황
18	출연기관 자본금 확보계획 및 확보실적(재원별)
19	출연기관 사업추진 실적
20	출연기관 입주업체 현황
23	민간자본보조 집행현황
25	사회단체 보조금 현황
26	16~21항목의 감사(자체,상급기관) 및 지도점검 결과 지적사항
27	주민숙원사업 집행내역(도급액 1천만원 이상)
52	도시계획사업 시행인가 현황
53	도시계획위원회 심의결과
54	도시계획시설 결정 및 변경현황
55	도시계획시설 매수청구 및 집행현황
56	경관위원회 심의결과
57	부동산 거래 및 불법행위 현황
58	개별공시지가 조사 이의신청 접수 및 처리현황
59	지적재조사 사업 추진
60	부동산중개업소 지도·점검 단속현황
61	시민생활안전사고 예방 및 대응 상황
62	급경사지 붕괴위험지구 정비사업
63	사회재난 예방 및 대응 상황
64	재해위험지구 정비사업 현황
65	우수저류시설 설치사업 현황
66	전주시 중대재해예방 추진
67	지역건축안전센터 설치운영 현황
68	전주형 주거복지 서비스 현황
69	저소득층 주거급여 지원 및 부정수급 관리현황
70	전주형 사회주택 공급사업 현황
71	청년 매입임대주택 공급사업 현황
72	주거 취약계층 주택관리 지원사업
73	시 지정 게시대 및 벽보판 운영 현황
74	불법광고물 단속 현황
75	도로개설·보행환경개선사업 현황
76	장기미집행 도시계획도로 보상 현황
77	가로등 조도 및 에너지 효율 개선사업 현황
78	전주천·삼천 일대 정비사업 현황
79	생태하천 복원사업 현황
80	지방하천 정비사업 현황
81	소하천 정비사업 현황
82	하천 유지·관리 현황
83	비점오염저감시설 관리 및 소류지 관리 현황
84	전주역사 개선사업 추진현황
85	교통약자 툭별교통수단 운영 현황
86	화물자동차 공영차고지 조성 현황
87	자전거도로 개설사업 현황
88	시민 자전거 보험 지급 현황
89	공영자전거 대여소 운영 현황
90	지능형 교통시스템 구축사업
91	시내버스 지간선제 노선개편 현황
92	간선급행버스체계 도입 현황
93	마을버스 운영 현황
94	시내버스 재정지원(회사별, 최근3년)
95	공공형 택시 운영 현황
96	부설주차장 무료개방 지원사업 현황
97	공영주차장 조성 및 개선사업 현황
98	공영주차장 관리 현황
99	유료 주차장 시설현황
100	무료 주차장 시설현황
101	공한지 주차장 시설현황
102	주·정차위반 과태료 부과 징수현황
103	무단방치차량 단속실적
104	어린이보호구역 시설물 정비 현황
105	교통시설물 유지보수 현황
106	차량 과태료 부과 징수 현황
107	자동차 등록 및 관리 현황
108	자동차 의무보험 미가입 운행사건 처리 현황
109	건설기계 등록 및 관리 현황
110	건축물 부설주차장 타용도 변경 단속실적
111	하천사용료 징수현황
112	도로점용료 징수현황
113	도로굴착 허가내역(대규모)
114	도로무단점유자 과태료 부과징수 내역

제406회 전주시의회 제2차 정례회

2023년도 행정사무감사

행정사무감사특별위원회

행정사무감사자료 별지

전주시 도시재생지원센터 민간위탁 협약서

전주시 도시재생지원센터 경영평가서

2022년～2023년 도시재생지원센터 위탁금 세출내역

1. 전주시 도시재생지원센터 민간위탁 협약서

2. 전주시 도시재생지원센터 경영평가서

▢ 2022∼2023년 경영평가서

3. 2022년～2023년 도시재생지원센터 위탁금 세출내역

▢ 2022년 정산내역

○ 정산총괄표

(단위 : 원)

구 분	예 산	집 행 액	잔 액	집행비율
2022년 위탁사업	451,380,000	389,762,292	61,617,708	86.3%

※ 이자수입 : 48,530원

☞ 반납액 : 보조금 집행잔액과 예치이자 발생액은 세외수입 처리(완료)

- 반납총액 : 금61,666,238원

○ 세부집행내역

(단위 : 원)

예산 과목	지출항목	지출내역
		수입금액	집행액 (누계)	집행잔액	집행 비율
총 합 계		451,380,000	389,762,292	61,617,708	86.3%
인 건 비		248,380,000	189,918,635	58,461,365	76.5%
운영경비		153,000,000	150,084,210	2,915,790	98.1%
사 업 비		50,000,000	49,759,447	240,553	99.5%

▢ 2023년 정산내역

○ 정산총괄표 : ’23. 10월 기준

(단위 : 원)

구 분	예 산	집 행 액	잔 액	집행비율
2023년 위탁사업	664,323,000	494,478,794	169,844,206	74.4%

○ 세부집행내역

(단위 : 원)

예산 과목	지출항목	지출내역
		수입금액	집행액 (누계)	집행잔액	집행 비율
총 합 계		664,323,000	494,478,794	169,844,206	74.4%
인 건 비		448,066,000	324,395,579	123,670,421	72.4%
운영경비		166,257,000	147,217,855	19,039,145	88.5%
사 업 비		50,000,000	22,865,360	27,134,640	45.7%