제206회 전주시의회 제2차 정례회

2003년도 행정사무감사특별위원회

2003년도

주요업무 추진상황 보고

상수도사업소

報 告 順 序

□ 一 般 現 況	...	2
□ 上水道公企業豫算	...	8
□ 2003년 推進目標	...	9
□ 主要推進業務	...	10

一 般 現 況

□ 자체 상수도시설 변천과정

□ 1924. 3. 상관정수장 신설 (시설용량 1,660□/일)

□ 62. 5월 1차 확장 □ 72. 7월 2차 확장 □ 74. 5월 3차확장

□ 84. 8월 4차 개량(20,000□/일)

□ 1924. 3. 완산정수장 신설 (시설용량 1,800□/일)

□ 40. 5월 1차 확장 □ 70. 10월 2차 확장(8,500□/일) □ 86. 5 폐쇄

□ 1940. 5. 서학보조수원지 신설 (취수량 300□/일)

□ 62. 6월 1차 확장 □ 69. 6월 2차 확장(8,500□/일) □ 86. 5 폐쇄

□ 1943. 7. 상관저수지 축조 (저수량 1,347,000□)

□ 62. 5월 저수지 확장(2,139,000□)

□ 1969. 12. 팔복정수장 신설 (고산수계 생활 및 공업용수 시설용량 35,000□/일)

□ 89. 9월 생활용수 폐쇄 □ 89. 12월 공업용수 확장(70,000□/일)

□ 1975. 10. 대성정수장 신설 (섬진강수계  시설용량 40,000□/일)

□ 1979.  8. 원당양수장 신설 (취수량 25,000□/일, 대성보조수원)

□ 1982.  8. 지곡정수장 신설 (삼천수계 시설용량 20,000□/일)

□ 2002.  3. 지곡정수장 생산중지 (전주권 광역 급수구역 편입)

□ 광역상수도 수수현황

□ 1985.  2. 금강광역상수도   수수           (배분량 102,000□/일)

□ 1996. 10. 섬진강광역상수도 수수           (배분량  40,000□/일)

□ 1998.  2. 전주권광역상수도 1단계 1차수수 (배분량 105,000□/일)

□ 2002.  2. 섬진강광역상수도 수수중지

□ 2002.  2. 전주권광역상수도 1단계 2차수수 (배분량 113,000□/일)

□ 2003.  2. 금강광역상수도 수계 전주권 광역상수도 전환

□ 기구변천 과정

□ 1922.  7.  건설과내 수도계 신설

□ 1961.  1.  수도과 승격(1과 5계)

□ 1979.  5.  수도국 승격(1국 2과 5계)

□ 1986. 10.  급수과내 누수방지계 신설

□ 1988.  7.  상수도관리사업소 신설(1소 3계)

□ 1989.  5.  완산,덕진구청 수도과 신설(2과 6계)

□ 1990.  9.  상하수도국을 건설국으로 기구개편 업무과와 급수과를

수도과로 통폐합

□ 1997.  3.  본청, 사업소, 구청등 분산 기구가 통합된 상수도사업소로

발족(상수도행정 일원화)

□ 2001.  1. 업무과를 수도행정과로, 운영과를 수질관리과로 개편

□ 2003.  1.  수도행정과 완산요금·덕진요금을 요금과 징수팀으로 개편

□ 기구 및 인력

□ 기    구   -  1소 3과 10담당(16사업장 2센타 1전산실)

																														소 장
					수도행정과																														급 수 과																												수질관리과
	업무								요금						징수							계량기관리														급수							시설							누수방지														관리							검사										보수
		전산실					계량기시험소							누수방지센타						방수리취수장				삼천취수장							원당취수장			전미취수장							상관수원지							대성정수장				지곡정수장			팔복정수장			인후배수지		천마배수지				효자배수지			완산배수지				송천배수지				서신배수지						금암배수지		화산배수지

□ 가압장 15개소

□ 인   력

부서 직급		정원	현 원
			계	수도행정과	급 수 과	수질관리과
합계		96	95	33	23	39
일반직	소계	45	45	14	12	19
	4급	1	1	1
	5급	3	3	1	1	1
	6급	10	10	4	3	3
	7급	16	20	6	4	10
	8~9급	15	11	2	4	5
연 구 사		4	3			3
기 능 직		47	47	19	11	17

□ 청경 22명, 일용 28명

□ 급 수 인 구

총인구	급수인구	보급율 (%)	1일 1인 급수량(□)	급수전	유 효 율		누수율 (%)
					유수율(%)	무수율(%)
명 626,069	명 592,639	94.70	388	172,063	70.48	13.79	15.73

□ 수계별 생산 및 급수구역

구 분			시설용량 (천□/일)	평상시 (천□/일)	급 수 지 역	급수인구	비율 (%)
총 계			388	300		592,639	100
생활용수	합 계		318	250	40개동	592,639	100
	자체상수도	소 계	60	40	8개동	98,658	17
		대 성	40	40	동, 서서학, 중화산1, 평화1,2 동,서완산, 효자1,	98,658 (8개동)	17
		지 곡	20	-	일 시 중 지
		상 관	-	-	대성수계 보충용
	광역상수도	전주권	258	210	중앙,풍남,태평,중노1.2, 교동,남노,서신,삼천1,2,3 중화2,평화1.2,효자2.3.4, 서노송,진북1.2,인후1.2.3, 금암1.2, 덕진, 우아1.2,호성 덕진, 팔복, 송천1.2동, 조촌 동산.	493,981	83
공업 용수	팔복정수장		70	50	팔복동 1, 2공단

□ 생활용수 급수구역은 생산량 및 수요량에 따라 조절

□ 송·배·급수관

단위 : □

총 연 장	송 수 관	배 수 관	급 수 관	비 고
2,016	70	610	1,336

□ 배수지 용량

구 분	배수지(개소)	시설용량(□)	비 고
계	10	113,600
	대 성	8,600
자체상수도	지 곡	1,000	생산중단
	완 산	1,000
	인 후	30,000
	천 마	30,000
광역상수도	효 자	15,000
	송 천	7,000
	서 신	7,000	가동중단
	금 암	7,000	가동중단
	화 산	7,000	가동중단

□공업용수 배수지  -----------------11,600□

□ 상수원 보호구역

상수도사업장	보 호 구 역			구역지정일	보호시설
	면적(□)	상류(Km)	하류(Km)		안내판	표주
계	26.96				37	158
방수리취수장	0.27	1.0	0.5	72. 5. 5.	6	40
상관수원지	25.99 (마치12.00 의암13.99)	전유역		24. 6. 9.	9	30
삼천취수장	0.28	2.2 (독배천0.7)	0.3	82. 6.19.	9	56
원당양수장	0.10	1.0	0.1	80. 8. 4.	6	18
전미취수장	0.32	0.5	0.3	67. 8. 5.	7	14

□ 상수원 수계별 『댐』 저수량

수 원	위 치	만수량(천□)	관리기관	비 고
계		817,139
상 관 제	완 주 군	2,139	전 주 시	대성수계보충
용 담 댐	진 안 군	815,000	수자원공사	전주권광역

上水道公企業豫算

총 규 모 : 60,686백만원

(2003년 본예산대비 2,370백만원 증)            (단위 : 백만원)

세 입			세 출
계 - 60,686(100%)			계 - 60,686(100%)
□ 상수도사업수익 - 55,270(91.1%)			□ 상수도사업비용 - 42,680(70.3%)
□ 영업수익 : · 급 수 수 익 : · 급수공사수익 : · 기타영업수익 : □ 영업외수익 : · 수입이자및배당금 : · 타회계부담금 : · 기타영업외수익 :	46,732 43,900 2,513 319 8,537 356 8,072 110		□ 인 건 비 : □ 물 건 비 : □ 이전경비 : □ 급수공사비 : □ 지급이자 : □ 예 비 비 :	3,670 31,678 2,044 1,597 3,244 447
□ 자 본 적 수 익 - 5,416(8.9%)			□ 자본비용 - 18,006(29.7%)
□ 고정부채수익 : □ 자본잉여금수익 : □ 유동자산수익 :	1,500 721 3,195		□ 자본투자비 : □ 부채상환금 : □ 예 비 비 :	8,457 8,315 1,234

2003년도 推進 目標

전국에서 가장 풍부하고 깨끗한 맑은물 공급

	추 진 목 표
□풍부하고 깨끗한 맑은물 공급 □시민이 만족하는 상수도 행정 □경영의 내실화로 자립기반 구축

□

□ 2003년 중점실천과제

□ 시민이 안심하고 마실수 있는 수돗물 생산 공급

□ 수요자 중심의 행정 서비스 체제 구축

□ 능률·효율행정구현으로 자립경영 조기 달성

主要推進業務

□ 전주권 광역상수도 1단계 3차수수사업	...	11
□ 맑은물 공급 대책 사업	...	12
□ 변방동 상수도 시설 보급 확대	...	15
□ 간이 급수시설 유지관리	...	17
□ 노후 및 고장계량기 교체	...	18
□ 국가공인 수질검사소 현대화사업 추진	...	19
□ 절 수 기 기 보 급 확 대	...	20
□ 먹는물 수질검사기관의 효율적 운영	...	21
□ 상수도 지하시설물 3차 전산화 사업	...	22
□ 상수도사업장 유지관리	...	23
□ 부 채 경 감 및 경 영 개 선	...	24

全州圈 廣域上水道 1段階 3次 收受事業

□ 금강광역상수도의 용수공급체계 조정(공업용수전환)에 대비하여 기존

금강계통 배수구역의 용담댐 수계 전환으로인한 안정적인 용수

공급을  위한 상수도 기반시설 확충

□ 事 業 槪 要

□ 배 분 량 : 102천□/일(금강광역수 □ 전주권 전환)

□ 사업개요 : 팔복배수지 신설 30천□, 송·배수관 L=11.3□

□ 사 업 비 : 31,500백만원

□ 사업기간 : 2002년 ∼ 2006년(4개년)

□ 2002年까지 推進實績

□ 전주시용역과제 심의위원회 심의 ------- 2001. 11

□ 실시설계 용역 발주 ------------------- 2002. 12

□ 2003年 推進實績

□ 배수지예정지 결정 및 측량완료 -------  2003.  5

□ 환경단체 및 전문가 간담회개최 -------  2003.  6

□ 실시설계“안”완료            -------  2003.  7

□ 환경성 검토협의(전주지방환경청) -----  2003.  7

□ 전문가설계자문 및 설계심의결과보완 --  2003.  7

□ 도시계획 시설(수도공급설비등)결정 ---  2003. 8 ∼ 11

□ 今後 推進計劃

□ 실시계획 인가 (환경부)        -------  2003.  11

□ 공사 및 감리용역 발주         -------  2003.  12

□ 사업착수 및 준공     ------------  2004. 3 ∼ 2006. 12

맑은물 供給 對策 事業

□20년 이상 노후 급□배수관 부설구간 및 적수발생 민원지역 우선개량

□ 事 業 槪 要

□ 사 업 량 : 828.9□ (급수관 607.9□   배수관 221.0□)

□ 사 업 비 : 60,888 백만원 (급수관 41,849   배수관 19,039)

□ 사업기간 : `92 ∼ 2011 (20년)

□ 사업내용

- 노후 급□배수관 교체 , 통합 및 개량공사

□ 2002年까지 推進實績 - 32.8%

□ 사 업 량 : 271.7□ (급수관 147.0□   배수관 124.7□)

□ 사 업 비 : 18,539백만원 (급수관 6,303   배수관 12,236)

□ 2003年 推進計劃

□ 사 업 량 : 29.9□ (급수관 23.0□   배수관 6.9□)

□ 사 업 비 : 2,259백만원 (급수관 1,200   배수관 1,059)

□ 2003年 推進實績 - 100 %

□ 사 업 량 : 29.9□ (급수관 23.0□   배수관 6.9□)

□ 사 업 비 : 2,259백만원 (급수관 1,200, 배수관 1,059)

□  노후배수관 사업별내역

(단위 : 천원)

연번	사 업 명	사 업 량	사 업 비	공정(%)	비고
계	12건	L=6.9Km	1,058,500	100
1	태평동 정심슈퍼부근 노후배수관 교체공사	D=100mm L=330m	64,000	100
2	인후1동동남수정아파트∼서낭당골목 노후배수관 교체공사	D=100mm L=630m	93,000	100
3	인후3동 인후교회부근 노후배수관 교체공사	D=150mm L=300m	25,500	100
4	덕진동 전북대학교 구정문주변 노후배수관 교체공사	D=100mm L=130m	31,000	100
5	서신동 서신연립부근 노후배수관 개량공사	D=150mm L=310m	50,000	100
6	반월동 신리마을부근 노후배수관 교체공사	D=150mm L=385m	50,000	100
7	중노1동사무소∼인봉리간 노후배수관 교체공사	D=150mm L=230m	48,000	100
8	삼천1동 주공아파트∼현대투자 신탁앞 노후배수관 개량공사	D=450mm L=910m	158,000	100
9	동서학동 남천교∼승암교간 노후배수관 개량공사	D=100mm L=1,290m	150,000	100
10	효자1동 서부시장∼쌍용@앞 노후배수관 개량공사	D=150mm L=700m	89,000	100
11	팔복동 학산마을부근 노후배수관 개량공사	D=150mm L=900m	180,000	100
12	인후1동 전주농고앞∼동진아파트옆 노후배수관 개량공사	D=350mm L=760m	120,000	100

□  노후급수관 사업별 내역

(단위 : 천원)

연번	사 업 명	사업량(m)	사업비	공정	비고
계	23건		1,200,000
1	인후2동 전북은행앞주변골목 노후급수관 교체공사	급수관D50∼16mm L=546m	58,624	100
2	인후동 반도연립앞골목 노후급수관 교체공사	급수관D75∼16mm L=596m	59,720	100
3	우아1동 지성교회주변골목 노후급수관 교체공사	급수관D100∼16mm L=238m	53,799	100
4	금암1동 세원아파트주변골목 노후급수관 교체공사	급수관D75∼16mm L=317m	45,656	100
5	금암2동 금암맨션주변골목 노후급수관 교체공사	급수관D50∼16mm L=424m	32,607	100
6	인후2동 노란자슈퍼주변 노후급수관 교체공사	급수관D40mm L=102m	9,125	100
7	동완산동 완산초등학교부근 노후급수관 교체공사	급수관D32∼16mm L=155m	16,513	100
8	효자1동사무소앞 노후급수관 교체공사	급수관D50∼16mm L=103m	28,088	100
9	덕진동 거성아파트주변골목 노후급수관 교체공사	급수관D50∼100mm L=293m	41,346	100
10	서완산동 시외버스정류장부근 노후급수관 교체공사	급수관D16∼75mm L=190m	42,939	100
11	팔복동 국도유지주변골목 노후급수관 교체공사	급수관D16∼100mm L=268m	34,485	100
12	효자1동신촌주택 주변 노후급수관 교체공사	급수관D16∼100mm L=100m	14,608	100
13	삼천1동 곰솔나무길 노후급수관 교체공사	급수관D50∼100mm L=87m	14,410	100
14	인후1동 순복음중앙교회부근 노후급수관 교체공사	급수관D16∼40mm L=166m	19,713	100
15	평화1동 극동아파트부근 노후급수관 교체공사	급수관D16∼50mm L=228m	22,312	100
16	평화2동 코오롱아파트부근 노후급수관 교체공사	급수관D16∼200mm L=572m	106,655	35
17	중노송동 병무청입구 외1개소 노후급수관 교체공사	급수관D50∼16mm L=257m	27,889	30
18	금암1동 금암초교뒤 노후급수관 교체공사	급수관D13∼50mm L=200m	34,313	20∼50
19	팔복동 학산마을 노후급수관 교체공사	급수관D13∼50mm L=160m	25,600	□
20	서완산동 삼원연립부근 노후급수관 교체공사	급수관D13∼50mm L=120m	19,200	□
21	남노송동 한양정육점삼거리부근 노후급수관 교체공사	급수관D13∼50mm L=160m	25,600	□
22	개인별 노후급수관(계량기실) 개량공사	급수관D13∼50mm L=5,510m	460,000	100
23	도로굴착 복구비		6,798

邊方洞 上水道 施設 普及 擴大

□ 事業槪要

□ 총 95개소 L=133.3km 4,696세대

- 변방동 : 68개노선  L=120km 3,685세대(110개마을)

- 시내권 : 27개소    L=13.3km 1,011세대

□ 사  업  비 : 15,400백만원(변방동14,000, 시내권1,400)

□ 추 진 기 간 : □99 ∼ 2011년

□ 2002年까지 推進實績

□ 사 업 량 : 42개소 L=51.06km(38.3%)

- 변방동  : 27개소 L=43.6km (36.3%)

- 시내권  : 15개소 L= 7.4km (55.6%)

□ 사 업 비 : 5,116백만원(변방동4,301, 시내권815)

□ 수혜인구 : 2,033세대(변방동1,401, 시내권632)

□ 2003年 推進計劃

□ 사 업 량 : 9개소  L=10.2km(변방동4개소6.5km,시내권5개소3.7km)

□ 사 업 비 : 1,435백만원(변방동934, 시내권501)

□ 2003年 推進實績

□ 공 사 중 : 2개소  L =  0.7km

□ 완    공 : 6개소  L =  6.5km

□ 今後 推進計劃

□ 사업 마무리  : 8개소  L= 7.2km

□ 명시이월추진 : 1개소  L=3.0km, 3개마을(원중동,오공,정문)

- 개인급수공사 비용부담 민원등으로 사업추진 지난

□ 변방동 및 시내권 배수관포설공사 사업별 내역

(단위 : 백만원)

연번		사 업 명	사 업 량	사 업 비 (예산액)	공 사 기 간	공 정 (%)	비고
계		9건	L=10.2km	1,435		80.5%
변방동	소계	4건	L=6.5	934		75%
	1	호성동 사거리마을 배수관포설공사	D= 50□ L= 0.5km	100	4.21∼ 6. 27	100%
	2	동산동 월평마을외1개마을 배수관포설공사	D= 75□ L= 1.0km	106	4.22∼ 8. 8	100%
	3	동산동 원만성외2개마을 배수관포설공사	D=75~100□ L= 2.0km	200	5.14∼ 8. 29	100%
	4	효자4동 중동마을 배수관포설공사	D=75∼200□ L=3.0km	390	설 계 완 료 (주민 사업유보 요청)
		도로굴착간접복구비	A=61.0a	138
시내권	소계	5건	L = 3.7	501		86%
	1	송천1동새마을금고 부근배수관포설공사	D=75~100□ L= 0.2km	20	3. 25∼ 7. 30	80%	공사 중지
	2	팔복동남북로야전마을부근배수관포설공사	D=150~300□ L= 0.5km	80	4. 4∼ 7. 8	100%
	3	효자1동사무소부근 배수관포설공사	D=150□ L= 0.5km	75	4. 8∼ 11. 30	50%
	4	동산동태평∼2공단 배수관포설공사	D=100□ L= 2.3km	230	5. 12∼ 10. 6	100%
	5	덕진동유토피아아파트부근배수관포설공사	D=100□ L= 0.2km	30	5. 16∼ 9. 15	100%
		도로굴착간접복구비	A=29.0a	66

簡易給水施設 維持管理

□ 상수도 미공급지역 간이급수 시설에 대하여 상수도 공급시까지 철저한

수질관리 및 시설유지관리로 이용하는 시민의 건강을 보호하고 시설

이용의 불편을 최소화

□ 事 業 槪 要

□ 현    황 : 43개소 (간이상수도21개소, 소규모급수시설22개소)

완산구 : 20개소  덕진구 : 23개소

□ 사 용 자 : 5,661명 (완산 2,834명    덕진 2,827명)

□ 관리방법

- 유지관리 : 주민자치 협의회 구성으로 자체 유지관리

- 수질관리 : 수질검사 년간 6회실시 (사업소에서실시 반기 2, 분기4 )

□ 2002年까지 推進實績

□ 원□정수 정기 수질검사 실시 : 6 회

□ 기능상실 시설물 타용도전환 및 폐지 : 7 개소

□ 간이급수시설내 소독기 시범설치 (2개소) 및 소독약 배부

□ 2003年 推進計劃

□ 사업량 : 배수지 개량 3개소, 폐공처리 2개소, 기타울타리 보수등

□ 사업비 : 50백만원 (도비 25, 시비 25)

□ 2003年 推進實績

□ 배수지 개량 3개소 완료(중인동 신금, 황소마을, 우아동 무능마을)

□ 모터 교체수리 1개소 : 호성동 한사월 마을

老朽 및 故障計量器 交替

□유효기간경과 계량기와 고장 계량기의 계획적인 교체사업 추진으로

계량기 불감수량을 줄여 유수율을 제고하여 상수도 사용료 세입증대

□ 事 業 槪 要

□ 사  업  량  : 334,925개

□ 사  업  비  : 13,283백만원

□ 추 진 기 간 :  □92 ∼ 2011년(20년 계획)

□ 계량기 유효기간 : 50mm이하 8년, 50mm초과 6년

□ 2002年까지 推進實績

□ □92∼2002년까지 실적 : 41% (137,925개 3,690백만원)

□ 2003年 推進計劃

□ 사 업 량 : 20,000개

- 고장계량기발생 조기 발견 신속한 교 체  - 3,500전

- 사용량 전산 비교를 통한 고장계량기 색출 시험 교체 - 300전

- 유효기간 도래 계량기 적기 교체 - 16,200전

□ 사 업 비 : 767백만원

□ 2003年 推進實績 - 95%

□ 사 업 량 : 노후, 고장계량기 교체 - 18,950개

□ 사 업 비 : 560백만원

□ 今後 推進計劃

□ 사 업 량 : 노후, 고장계량기 교체 - 1,050개

□ 사 업 비 : 29백만원

※ 유수율 제고 1.2% - 급수수익 증대 557백만원

]

國家公認 水質檢査所 現代化事業 推進

□ 국가공인 수질검사소 신축 및 첨단 분석장비를 보강하여

수질검사기관의 신뢰성제고 및 안전한 수돗물 공급

□ 事 業 槪 要

□ 수질검사소 신축

- 지상2층 철근콘크리트구조 (대성정수장내 연건평 200평)

□ 검사장비 보강  : GC(가스크로마토그래피)외 1종

- 중금속, 농약류, 유기화학물질등 유해성물질분석장비 보강

□ 사 업 비 : 970백만원(수질검사소 신축 740, 분석장비 230)

□ 2003年 推進實積

〈 수질검사소 신축〉

□ 2002. 2 ∼ 3 : 기본 설계 용역

□ 2003. 6 ∼ 8 : 실시 설계 용역

□ 2003. 9.  29 : 건축협의 (완산구청) 완료

□ 2003. 10. 21 : 공사 발주

□ 2003. 11 ∼  : 공사 착공 및 감리용역 시행

〈 수질검사장비 보강〉

□ 2003. 2. 14 : 검사장비 구입관련 조달청 외자구입 요구

□ 2003. 5. 29 : 페놀·시안·ABS 자동화학분석기 도입

□ 2003. 7. 25 : GC(가스크로마토그라피) 도입

※ 현재 85개항목 수질검사 실시중 - 수작업의 자동화 및 정밀성 제고효과

□ 今後 推進計劃

□ 수질검사실 신축공사 추진 - 2004년 5월 완공 예정

□ 신축완공후 실험장비 및 부대설비등 이설

節水器機 普及 擴大

□ 공공시설물, 공동주택, 단독주택의 급수장치에 절수기기를 설치 물절약을     생활화하고 물의 소중함을 인식시켜 21세기의 물부족 사태에 적극적     으로 대처

□ 事 業 槪 要

□ 총 계 획 : 595,000개

(양변기 132,141  수도꼭지 342,859   샤워기 120,000)

□ 사 업 비 : 1,200 백만원

□ 사업기간 : 2000 ∼ 2004년

□ 2002年까지 推進實績

□ 설치 절수기 : 120,759개(20.3%)

- 양변기 절수기 : 96,840개

- 수도꼭지 및 샤워기 절수기 : 23,919개

□ 사 업 비 : 424백만원

□ 2003年 推進計劃

□ 사업규모 : 30,000개(양변기 절수지 10,000, 수도꼭지 20,000)

□ 사 업 비 : 51백만원

□ 2003年 推進實績

□ 11월 현재 36,220개 설치 완료

`

□ 今後 推進計劃

□ 지속적인 절수기 설치사업 추진으로 물절약 운동의 효과증대 노력

먹는물 水質檢査 機關의 效率的 運營

□ 국가공인 수질검사기관의 효율적인 운영을 통하여 검사기관의

신뢰성 확보 및 수수료수입 증대로 상수도 경영행정을 구현

□ 現    況

□ 지정번호 : 먹는물수질검사기관 제33호

□ 지정일자 : 2000. 7. 25  [국립환경연구원 승인]

□ 검사범위 : 먹는물(수돗물 등), 상수원수, 먹는샘물, 각종 지하수

□ 수 수 료 : 검사시료에 따라 400원/건 ∼ 230,200원/건

□ 2003年 推進實積

□ 도내 4개 권역별 지속적인 홍보추진으로 수탁검사 유치제고

- 각 시·군 수질관련 부서 및 교육청, 지하수개발업체 등에 홍보

□ 수탁검사 운영실적(`00.10∼`03.6) ― 총 793백만원 (16,099건)

- 2003. 10. 31현재  : 306백만원(7,718건)

※ 2002년도 동일기간대비(214백만원) 42.9% 증가

□ 2003년도 전국 수질검사기관 정기 정도심사(AQC)결과 합격판정

- 6.13∼7.12 국립환경연구원 주관으로 전국 70개 수질검사기관 대상시행

□ 今後 推進計劃

□ 시민 신뢰도 향상을 통한 검사기관의 이미지제고 및 경영행정 구현

□ 신속·정확·친절한 대민서비스를 통하여 수탁 검사유치율 증진

□ 지하에 복잡하게 얽혀있는 상수도관에 대한 위치와 속성정보(관경,

재질, 시공일자등)를 전산화하여 통합관리하므로써 시설물 관리에

소요되는 인력과 예산절감 각종 굴착공사등으로 인한 사고를 사전 예방

上水道 地下施設物 3次 電算化 事業

□ 事業槪要

□ 상수도 관로 조사 / 탐사 및 DB구축

- 총연장(상수도 관로) : 3종 2,016□

- 총 사 업 비         : 3,524백만원

- 사 업 기 간         : 1, 2단계 - 1998. 12. 21∼2000. 10. 31

3단계  - 2003. 6 ∼ 2004. 4월

□ 2002年까지 推進實績

□ 1,2단계 사업 ------- 2000. 10. 31 완료

- 사 업 량 : 송·배수관 456□  →  조사 / 탐사 / DB구축

- 사 업 비 : 2,860백만원(국비 50%,  시비 50%)

□ 2003年 推進計劃

□ 3단계 마무리사업

- 사 업 량 : 조사 / 탐사 → 135□,  DB구축 → 103,25□

- 사 업 비 : 664백만원(사업비 640, 성과심사 24)

□ 2003年 推進實績

□ 상수도 조사/탐사 : 77,4□ (57.3%)

□ 관로 절대측량    : 71,5□ (52.6%)

□ DB조사 구축     : 65.3□ (60.6%)

□ 今後 推進計劃

□ 조사/탐사/DB구축     : 2004. 2월

□ 도면제작 편집 및 출력 : 2004. 2월

□ 사업 총괄 성과심사    : 2004. 4월

上水道 事業場 維持管理

□ 각 사업장 노후시설물을 기획적으로 유지관리하여 안전사고 사전예방

□ 관로 누수 및 응급복구 사항 신속 복구로 안정적인 수돗물 생산

□ 事 業 槪 要

□ 사 업 량 : 16개소(취수장 4, 정수장 4, 배수지 8)

□ 사업내용

- 매월 정기적인 안전점검을 실시 노후시설 정밀분석 개량

- 정수장 시민공개에 따른 쾌적한 환경개선 사업 추진

- 불시 사고발생으로 인한 정수생산 중단등 불안전요인 사전해소

□ 2003년 推進計劃

□ 사  업  량 : 14개소 사업장 유지보수(3개소 가동중단시설)

- 구   축   물 : 사업장 시설개량·환경개선(관리실개축등) 유지보수

- 기계·전기시설 : 유량 및 수위설비 개량 과 돌발사고 긴급복구 수선

- 기타·응급복구 : 도·송수관 누수발생시 관로 긴급 보수 등

□ 사 업 비      : 556백만원

□ 2003年 推進實績

□ 사업개요 : 55건 537백만원(구축물, 기계·전기, 기타·응급복구)

- 구   축   물 : 팔복정수장 퇴수관로 보수외 7건    - 230백만원

- 기계·전기시설 : 대성정수장 침전지 응집기 수선외 14건 - 268백만원

- 기타·응급복구 : 공업용수 도수관 등 누수복구외 3건 -  39백만원

- 자체점검보수 : 부품교체 등 경미한 사항 수시시행

□ 今後 推進計劃

□ 구축물, 기계·전기시설 및 기타 시설에 대하여 매월 일상점검을

통하여 사전 유지보수로 안전적인 수돗물 생산 공급

□ 각종 설비 등 돌발사고 발생시 긴급 복구 수선

負債 輕減 및 經營 改善

□ 負債現況 (2002.12월말 기준)

□ 총 부채액(원금) ------ 75,071백만원

- 전주권광역상수도부담 : 25,337백만원(33%)

- 기    타    부    채 : 49,734백만원(67%)

□ 減縮 方案

□ 상수도 공기업 지방채 부채 획기적 축소로  건전 재정운영

- 2002년말 원금 750억원 □ 2006년까지 원금 355억원으로 경감(원금 395억원 감)

□ 상수도 시설개량(맑은물공급대책)사업 외 지방채 추가발행 원칙적 제한

- 매년 발행액 15억(이자율 3.58%중 국고보조 2.25%)

□ 매년 부채상환기금 5억원 이상 출연 고금리순 부채 조기상환

- 매년 일부 순세계잉여금 5억원 정도 부채 상환기금 적립

□ 지금까지 推進實績 (전년대비 42.7% 경감)

상환액 : 348억원(원금 321억원, 이자 27억원)

□ 수도법 개정으로 광역정수장 건설분담금 수공 전대

- 융자잔액 전대 ----  24,558백만원

□ 고리부채 조기상환(6건, 3,356백만원 상환, 이자 667백만원 경감효과)

- 재정자금(5.5%, 2건) ------  1,300백만원  (이자  219백만원 경감효과)

- 토특자금(5%, 2건)   ------    456백만원  (이자    40백만원 경감효과)

- 재특자금(6.1%, 2건) ------  1,600백만원  (이자   408백만원 경감효과)

□ 기타  정기분 납기도래분 상환  -----  4,180백만원,  이자 2,684백만원

□ 2003년 11월 총 부채액(원금) : 44,477백만원(신규차입15억원포함)

□ 지역개발기금 (4.5%) ------    19,930백만원

□ 토특자금 (5%)       ------     2,630백만원

□ 재특자금 (4.28%)    ------   14,255백만원

□ 환특자금 (3.78%)    ------     7,706백만원

□ 今後 推進 計劃

□ 정기 도래분 상환 : 3억원 (4/4분기:3억원)

□ 고금리 부채 조기상환(토특자금 5% 2건) : 1,130백만원(12월중)

※ 이자 : 158백만원 경감 효과

※ 2003년말 부채액 43,047백원(2002년 대비 42.7% 경감)