제206회 전주시의회 제2차 정례회

2003년도 행정사무감사특별위원회

2003년도

주요업무 추진상황 보고

도 시 관 리 국

	보 고 순 서

□  일    반    현    황   □□□  2

□  2003년도 시 책 방 향    □□□  8

□  2003년도 주요업무추진상황   □□□  9

□  도     시     과        □□□□   10

□  주 택 행 정 과        □□□□   17

□  도     로     과        □□□□   24

□  교     통     과        □□□□   41

□  하     수     과        □□□□   48

□  도시발전기획단        □□□□   63

□  차량등록사업소        □□□□   66

일  반  현  황

□ 기구 □□  5과  1단  1사업소  29팀(현원 144명)

															도 시 관 리 국
	도 시 과														주 택 행 정 과																도 로 과
도시관리			도시계획				도시정비			지적				주택행정			공동주택			일반건축			구도심			농촌지역				도로행정			도로기획			도로건설			도로보수			교통시설

	교 통 과														하 수 과										도시발전기획단																차량등록
교통관리			교통지도				대중교통			교통운영				치수			시설			재난방재				용지보상			사단이전			기반조성			신시가지			경전철				관리			등록			검사

□ 인력                                         ( 2003. 11월현재)

과 별		총 계	일 반 직						별정직	기능직
			4급	5급	6급	7급	8급	9급
계	정 원	143	1	7	29	37	35	3	1	30
	현 원	144	1	7	29	50	24	1	1	31
도 시 과	정 원	22	1	1	4	4	8		1	3
	현 원	22	1	1	4	8	4		1	3
주택행정과	정 원	18		1	5	6	5			1
	현 원	18		1	5	8	3			1
도 로 과	정 원	21		1	5	9	4			2
	현 원	20		1	5	8	4			2
교 통 과	정 원	25		1	4	5	4	2		9
	현 원	28		1	4	9	4	1		9
하 수 과	정 원	16		1	3	5	3	1		3
	현 원	16		1	3	6	3			3
도시발전 기 획 단	정 원	18		1	5	7	3			2
	현 원	17		1	5	9				2
차량등록 사 업 소	정 원	23		1	3	1	8			10
	현 원	23		1	3	2	6			11

□ 분장사무

과 별	분 장 사 무
도 시 과	□ 도시계획결정·지적고시 및 개발제한구역 관리 □ 택지개발사업·구획정리사업 및 가로등관리 □ 사업지구 용지보상 및 전문건설업, 건설기계사업자 관리 □ 개별공시지가, 지적측량검사, 새주소부여사업관리
주택행정과	□ 국민주택관리·상환금 운영 □ 주택건설사업계획승인, 사용검사, 주택정책 수립 □ 건축인·허가, 건축심의, 건축조례 제·개정운영 □ 주거환경개선, 구도심활성화사업, 농촌지역개발사업
도 로 과	□ 도로부지관리, 도로안내표지판 설치관리 □ 도로포장 보수지도, 자전거도로 시설 □ 신규도로개설 및 용지보상 □ 가로환경 및 노점상 지도단속, 자전거이용 활성화 □ 도로교통안전시설물 신설 및 유지관리
교 통 과	□ 교통종합계획 수립 □ 자동차운송사업체(버스. 택시 등) 지도감독 □ 교통정보센타운영 및 관제시스템유지관리 □ 교통영향평가 업무 및 교통체계개선 사업 □ 시설관리공단 설립 추진
하 수 과	□ 하수도공기업 운영, 건교부소관 국·공유재산 관리 □ 하수처리장 건설, 하수 관거사업 추진 □ 재난재해대책, 자연하천조성사업, 하천관리
도시발전기획단	□ 서부 신시가지 조성사업 □ 35사단 이전사업 □ 경전철사업 추진 □ 전주교도소 및 연초제조창 이전사업 추진
차량등록사업소	□ 자동차 등록(전산입력, 자료관리 및 증명발급 등) □ 자동차 및 건설기계 과태료부과 □ 건설기계등록(전산입력,증명발급,검사최고,정비명령 등)

□ 기본현황

○ 도시계획 연혁

년 월 일	고 시 청	번 호	계획면적 (□)	목표 년도	계획 인구	주 요 내 용
□38. 5. 9.	조선총독부	403	19.76	1948	100,000	도시계획구역 결정(1차)
□66. 2. 10.	건설교통부	2,188	108.71	1983	550,000	도시계획 재정비(2차)
□70. 4. 14.	″	178	157.82	1986	500,000	도시계획 재정비(3차)
□73. 6. 27.	″	258	313.20			개발제한구역 216.4□ 지정
□74. 8. 14.	″	272	313.20			도시계획 재정비(4차)
□76. 3. 27.	″	37	313.20			도시계획 재정비(5차)
□86. 5. 8.	″	206	313.20	1991	610,000	도시계획 재정비(6차)
□95. 6. 29.	전라북도	112	313.20	2001	860,000	도시계획 재정비(7차)
□03. 6. 26.	건설교통부	161	313.20			개발제한구역 해제216.4□

○ 용도지역  □□--------------  4개지역 313.20□

구분	주 거 지 역			상 업 지 역	공 업 지 역				녹 지 지 역
	계	일반주거	준주거		계	전용공업	일반 공업	준공업	계	생산 녹지	자연 녹지
면적	29.825	29.740	0.085	3.710	6.328	1.444	4.216	0.668	273.337	4.821	268.516
비율 (%)	9.53	9.50	0.03	1.19	2.01	0.46	1.34	0.21	87.27	1.54	85.73

○ 용도지구  □□□------------  8개지구 15,863,698□ (4,799천평)

지 구 명	개 소 수	면 적(□)	비 고
고 도	16	8,202,200
방 화	19	3,709,784
미 관	47	1,973,284
자연취락	58	1,225,851
경 관	7	406,500
시설보호	1	249,900
아 파 트	1	90,000
보 존	2	6,179

○ 주    택

구 분	계	단독주택	다세대 주택 동당660□미만	연립주택 (4층이하)	아파트 (5층이상)	주택보급율 (2002년도)
주 택 수	177,063	58,330	3,736	4,635	110,362	90.56%
비율(%)	100	32.94	2.11	2.62	62.33

○ 지    적

(단위 : □)

구분	합 계		대 지			임 야			기 타
	필지수	면적	필지수	면적	%	필지수	면적	%	필지수	면적	%
계	190,604	206.2	72,939	23.5	11.4	10,646	72.6	35.2	107,019	110.1	53.4

○ 도    로

(단위 : 개소.□)

구 분	계		고속국도		일반국도		지 방 도		시 도
	노선	연 장	노선	연 장	노선	연 장	노선	연 장	노선	연 장
총연장	129	391	1	5	5	65	3	22	120	299
포장도	129	391	1	5	5	65	3	22	120	299
포장율 (%)		100		100		100		100		100

※ 도로율 : 16.28%(도로면적/시가지면적)

○ 교량 및 기타시설물

(단위 : 개)

구분 계	교 량					육교 보도	지하 보도	지하차도	터널	비 고
	소계	고속 국도	시의 국도	지방도	시도
115	95		26	3	66	7	6	5	2

※ 장대교량(삼례교 : 570m,  회포대교 : 707m)

○ 건설기계조종사면허 현황

(단위 : 건)

계	불도우저	굴삭기	로우더	지게차	기중기	로울러	기타
5,383	354	1,827	473	1,292	257	104	1,076

○ 옥외광고물 현황

(단위 : 개)

광고업자 등록현황	시 지 정 광 고 시 설				비 고
	계	게시대	벽보판	기타
410	519	153	366	-

○ 운수업체

(단위:개소/대)

구 분	계	버 스			택 시		화 물		렌트카	특수차	특수여객
		시내	시외	관광	회 사	개 인	회 사	개 인
업 체 수	215	5	5	16	25	2	79		19	49	15
보유대수	9,592	410	460	275	1,599	2,095	1,766	2,050	685	224	28

○ 자동차등록

(단위 : 대)

합 계	승 용 차	승 합 차	화 물 차	특 수 차
190,119	137,352	14,865	37,598	304

○ 하    천

(단위 : □)

구 분		개소	하천연장	제 방 연 장			개수율 (% )	비고
				계	기개수	미개수
계		33	118.3	202.2	182.4	19.8	90.2
법정하천	소 계	30	111.9	189.4	176.0	13.4	93.0
	국가하천	3	14.8	25.6	25.6	-	100.0
	지방 1급	2	21.2	37.5	36.0	1.5	96.0
	지방 2급	25	75.9	126.3	114.4	11.9	90.6
소 하 천		3	6.4	12.8	6.4	6.4	50.0

○ 하 수 도

구 분		처리구역 (□)	계획연장 (□)	시설연장 (□)	미시설연장 (□)	보급율 (%)	비고
계		53.0	1,824.9	1,246.2	578.7	68.3
합 류 식		13.0	661.3	661.3	0	100
분류식	소 계	40.0	1,163.6	584.9	578.7	50.2
	오수관거	-	672.4	333.1	339.3	49.6
	우수관거	-	491.2	251.8	239.4	51.3

○ 하수처리

구 분	시설용량	처리용량	처리율(%)	비 고
하수종말처리장	303천톤/일	289천톤/일	100	1 단계 : 103 2 단계 : 200 증설계획 : 100

2003년도 시책방향

	21C쾌적한 인간중심의 환경생태도시 건설
□ 주민참여를 통한 지속가능한 도시만들기 추진 □ 대중교통 활성화를 위한 교통모범도시 건설 □ 재난방재의 대응체계 혁신으로 피해 사전예방

□

	중점추진방향
□ 환경 친화적 도시조성을 위한 도시재정비 추진 □ 친근함과 윤택함이 있는 교통관련시설의 정비 및 확충 □ 도시 저소득층의 삶의질 향상을 위한 주거환경개선 □ 친수성이 풍부한 자연형 생태하천 조성 □ 실수요에 대비한 택지개발로 안정적인 주택공급

2003년도

주요업무추진상황

도 시 과 소관

□ 도 시 계 획 재 정 비  추 진    /  11

□ 개 발 제 한 구 역 해 제   추 진     /  12

□ 송천지구 토지구획정리사업    /  13

□ 아 중 지 구  체 련 공 원  조 성    /  14

□ 새  주  소   부  여  사  업  활  용    /  15

□ 토지관리정보시스템 인터넷확대운영    /  16

도시계획 재정비 추진

기 수립된 도시기본계획과 개발제한구역의 전면 해제 등 여건변화에

능동적으로 대처하고 장기적 도시발전 방향의 재정립과 구체적

실천계획 마련

□ 사업개요

□ 계획기간 : 2001.05 ∼ 2004.06월

□ 사 업 비 : 946백만원

□ 목표연도 : 2011년     □ 계획인구 : 760천명

□ 주요 계획내용

- 도시계획구역의 조정, 용도지역·지구의 변경

- 일반주거지역 종세분 ∀ 제1종,  제2종,  제3종

- 도시계획시설의 전면 재검토

(공원내 집단취락지 및 아중유원지 해제포함)

□ 추진실적

□ 도시계획(재정비)□안□마련 및 도시계획소위원회 --- 2002.11

- 용도지역·지구의 변경, 일반주거지역종세분, 도시계획시설의 재검토 등

□ 도시계획(재정비)□안□ 주민 공람  ----------- 2002.12.17∼12.31

□ 일반주거지역 종세분 시도시계획위원회 보고회 -----  2003.01

□ 일반주거지역 종세분 전문가 의견수렴(2회) --------  2003.09∼10

□ 이후계획

□ 도시계획재정비(안) 재공람 실시 ----------------  2003.11

□ 시도시계획위원회 자문및 시의회 의견청취 ------  2003.12

□ 도시계획 재정비 완료 --------------------------  2004.06

개발제한구역 해제 추진

□ 해제현황

□ 해제면적 : 225.40□

- 전주시 : 103.04  - 완주군 : 101.56  - 김제시 : 10.80

□ 그동안 추진사항

□ 개발제한구역 해제신청(전라북도∀건설교통부) --- 2002.11.07

□ 중앙도시계획위원회 상정  --------------------- 2003.04.04

□ 개발제한구역 해제결정·고시(건설교통부) --------  2003.06.26

□ 개발제한구역 해제지역 용도지역결정·고시(전북도)- 2003.07.12

※ 토지이용계획

구 분	계	보전녹지지역	생산녹지지역	자연녹지지역	비고
면적(□)	225.40	116.36	43.89	65.15
비율(%)	100.0	51.6	19.5	28.9

□ 지형도면승인·고시(전주시) --------------------- 2003.10.22.

□ 해제효과

□ 주민의 생활불편 및 사유재산권 침해 문제해소

□ 광역쓰레기매립장 등 우리시 현안사업의 정상적 추진 가능

□ 북부권 개발을 통하여 광역도시기반을 구축할 수 있는 토대 마련

송천지구 토지구획정리사업

□ 계획적인 택지개발로 낙후된 송천동 지역의 균형적인 도시발전도모

□ 아파트지구 지정후 장기 미 집행으로 인한 집단 반복민원 해결

□ 효율적인 토지이용 및 도시기반시설 확충

□ 공사개요

□ 위    치 : 덕진구 송천동 1·2가 일원(농수산물도매시장 남단)

□ 사업규모 : 택지조성 262,480□ (79,400평)

□ 사업기간 : 2001.07 ∼ 2004.12월

□ 총사업비 : 16,255백만원(공사비 9,787 보상비 및 기타 6,468)

□ 추진실적(공정40%)

□ 사업시행 인가    ------------------------------  2001.07.23

□ 공 사 착 공      ------------------------------  2001.11.15

□ 도시계획 변경, 지구단위계획 결정을 위한 시 도시계획위원회 자문    및 시의회 의견 청취    ------------------------  2002.06.04

□ 문화재 발굴조사(31,400□) 완료  --------------  2002.10.30

※ 발굴유적 - 청동기시대 주거지 1기, 원삼국시대 주거지 66기 등

□ 발굴문화재 심의   -----------------------------  2002.12.27

※ 문화재 보존지역 결정 - 도로망 존치(약2,100여평 보존)

□ 도시계획 변경 결정을 위한 주민의견청취 ---------  2003.04

□ 도시계획 변경, 지구단위계획 결정을 위한 시 도시계획위원회

자문 및 시의회 의견 청취  ----------------------  2003.06

□ 도시계획 변경, 지구단위계획 결정을 위한 교통영향평가 심의완료 ---  2003.08

□ 도시관리계획 결정(변경)신청(전주시∀전북도) ---- 2003.10.28

□ 이후계획

□ 도시계획 변경 및 지구단위계획 결정고시 ----------  2003.12

□ 환지예정지 지정  -------------------------------  2004.02

□ 체비지공고 및 매각절차 이행    --------------------  2004.03

□ 사 업 완 료     --------------------------------  2004.12

아중지구 체련공원 조성사업

□ 아중지구 개발 완료에 따른 유입인구 증가로 지역 주민들의 보건□

휴양 및 정서생활 향상에 기여할 공간조성 필요

□ 동물원 인근 체련공원을 제외하고 실질적으로 이용되고 있는 체련

시설이 전무하여 도시공원법의 도시자연공원 지정목적에 적합하고

이용이 가능한 휴식(체련)공간 조성

□ 공사개요

□ 위    치 : 덕진구 인후1가, 우아1가 일원(아남아파트 남측)

□ 사업규모 : 49,037□(14,834평)

□ 총사업비 : 110억원

- 1단계(2002∼2004) : 95억원(용지□지장물보상 38억, 공사비 57억)

- 2단계(2005∼2006) : 15억원

□ 조성기간 : 2002년 ∼ 2006년(5개년)

□ 내    용 : 다목적구장, 수영장, 혼합경기장, 가족단위 조경휴게지, X-GAME장, 베드민턴장, 게이트볼장, 배구장 등

□ 추진실적

□ 아중지구 체련공원 조성사업 추진계획 수립  ------  2001.11

□ 기본계획 보완 및 실시설계 용역 착수   ----------  2002.03

□ 주민 설명회 개최 및 의견 반영  -----------------  2002.04

□ 기본계획보완 및 실시설계 용역 완료   -----------  2002.11

□ 토지 및 지장물 보상 착수   ---------------------  2002.12

□ 공유재산 관리계획 승인   --------------------------  2003.10

□ 이후계획

□ 공 사 착 수  -----------------------------------  2003.11

□ 공원조성계획 변경 등 절차이행   ----------------  2003.12

□ 공 사 완 료(제1단계사업)  ----------------------  2004.12

새주소 부여 사업 활용

새주소사업이 완료되었기에 시민들의 실생활에 활용할 수 있도록

홍보 관리하며 신규 및 수정되는 새주소에 대한 명판 설치

□ 사업개요

□  위    치 : 전주시 전지역

□  사업기간 : 1999.01 ∼ 2002.05

□  사업규모 : 건물번호판 60,000개. 도로명판 7,200개

□  사 업 비 : 2,289백만원(국비 210.  시비 2,079)

□ 추진상황

□ 도로명판 및 건물번호판 시내 전지역 설치 완료

□ 새주소 안내지도 발행 배포

□ 전자문서의 기안용지 상단에 새주소 병기

□ 각종 고지서 등에 새주소 병기하여 발송

□ 이후계획

□ 인터넷 사용 권장과  방송·신문 및 정보지를 통한 홍보 강화

□ 신설도로 신축건물 등으로 발생되는 신규 및 수정되는 명판에

대하여 신속하게 수정 및 설치

□ 초등학생 및 유치원생의 □우리집새주소알아오기□ 등의 과제물을

통하여 자연스럽게 새주소 홍보

□ 재산세 고지서의 새주소 병기 및 도시가스업체의 고지서 등에

새주소 병기 협조 요청

□ 기대효과

□ 각종 재난·재해시 신속한 대처가능

□ 신속한 택배 및 배달 써비스로 물류비 절감

□ 외국인 및 타지 손님 방문시 편리하게 목적지 방문가능

토지관리정보시스템 인터넷 확대 운영

□ 토지와 관련된 도형 및 속성, 법률자료 등의 모든 데이터를

전산화하는 토지관리정보체계가 완료됨으로서,

□ 토지관련 자료를 인터넷에 공개, 우리시 토지에 관련된 자료는

어디서나 열람할 수 있는 시스템으로 발전시켜, 토지관련 정책의

생산성과 효율성을 제고하고 대민서비스를 획기적으로 개선코자함

□ 사업개요

□ 토지관련 데이터 전산화 완료에 따른 전산자료 인터넷 공개

- 지적(임야)대장 자료.           - 지적(임야)도면 자료

- 공시지가 자료.                 - 수치지형도 자료

- 토지이용계획확인원 속성 및 도면 자료

□ 소요 비용 : 25백만원

□ 추진상황

□ 건교부 주관 전국 12개 시·군중 우리시가 선정되어 2001.09 사업완료

□ 구청에서는 민원발급 및 업무용으로 본청 실·과에서는 도시계획  입안 및 업무용으로 사용.

□ 이후계획

□ 인터넷 기반 토지정보 조회시스템 개발 ---- 2004.03∼2004.04

□ 토지정보 조회시스템 시범 운영 ----------- 2004.05∼2004.06

□ 토지정보 조회시스템 운영  --------------- 2004.06

□ 기대효과

□ 시민들이 행정기관에 방문하지 않아도 되므로 경제적 절감 효과

□ 빠른시간에 조회 및 발급이 가능하여 행정에 대한 신뢰도 향상

□ 합리적인 토지정책 수립

□ 미래지향적 정보사회 기반 확립

주택행정과

□  국민주택융자금 회수 및 상환    / 18

□  도시주거환경 개선사업   /  19

□  아름다운 건축상 시상   / 22

□  농촌지역주거환경개선사업   /  23

국민주택융자금 회수 및 상환

국민주택 융자금 자진 상환유도와  고질·고액 연체자에 대하여

강력한 징수를 통하여 체납사고 사전 예방 및 체납액 회수

□ 융자금 현황

□ 차 입 액 : 3,467세대   21,160,700천원

□ 조    건 : 1년 거치 19년 체증식 상환

□ 상환기간 : 1977 ∼ 2008년

□ 상환금리 : 약정이자 년6%(연체이자 년12%)

□ 추진실적

□ 상환예정액 : 18,963,925천원

□ 상  환  액 : 17,355,540천원(92%)

□ 상환체납액 :  1,608,385천원

※ 2004년이후 2,196,775천원

□ 이후계획

□ 상환잔액 : 3,805,160천원

□ 2004년 상환예정액 : 1,392,508천원

(원금 1,305,699천원. 이자 86,809천원)

□ 고액체납자 방문독려 지속 실시

□ 연체자 납부독촉장 발부(수시)

□ 실소유자 인적사항조사(임의 소유권이전 및 매매자)후 징수독려

□ 근저당 설정금액 도달체납자 경매실시

도시 주거환경 개선사업

도시저소득 주민을 위한 주거환경개선의 지속추진으로 삶의 질을

향상시키고 모든 시민이 함께 잘사는 으뜸 복지도시건설

□ 사업개요

□ 대       상 : 도토리골 지구외 17개지구

□ 면       적 : 863,571□ (261,231평)

□ 인구/건물수 : 16,881명 (5,146가구)/3,822동

□ 사 업 기 간 : 1999 ∼ 2004년

□ 사  업  비 : 88,645백만원(국비36,596  교부세8,123  시비43,926)

□ 추진실적

□ 17개지구 지정고시  -------------------------- 1999.11.24

□ 개선계획 고시 (14개지구) -------------------- 2000.07.21

□ 주거환경 3개년 사업계획 확정(건교부→시) ---- 2001.07.09

(국비36,596백만원.  교부세 7,319백만원)

□ 농원지구 개선 계획고시 ---------------------- 2001.12. 31

(사업시행자 지정 및 협약체결완료, 전주시 ∃ 주택공사)

□ 농원지구 사업계획 승인  --------------------- 2002.02.01

□ 낙수정지구 지정고시  ------------------------ 2002.12.26

□ 낙수정지구 개선계획수립고시 ----------------- 2003.05.07

□ 기반복리시설 사업추진 (총공정 85%)

□ 사업완료 4개지구(병사부, 마당재2, 화산2, 보문2)

※ 2003년 완료예정지구(8지구) : 도토리골, 어은2, 어은3,

밤나무골,  앞검암, 수도, 용머리2, 용머리3

□ 이후계획

□ 2004년 소요예산액 : 5,884백만원(국비1,766 교부세807 시비3,311)

- 2004년 사업완료 : 낙수정, 오목대2, 공수내, 효정, 난민촌2

- 2005년 사업완료 : 인후 농원지구

□ 도시주거환경개선사업 지구별 현황

(단위 : 백만원)

지구명	사 업 계 획	사업비	추진실적 (%)
계	18개 지구	88,645	85
도토리골 (진북2동)	도로개설2, 주차장1, 경노당1, 어린이놀이터1	3,389	95
어 은 2 (진북2동)	도로개설2, 주차장1, 경노당1, 놀이터1, 휴게시설1, 소공원1	2,787	95
어 은 3 (진북2동)	도로개설6, 주차장2, 놀이터2, 소공원1	5,666	90
보 문 2 (인후1동)	도로개설2	950	100
밤나무골 (금암1동)	도로개설7, 주차장3, 놀이터1, 휴게시설(경노당)1	4,991	95
앞 검 암 (금암2동)	도로개설4, 주차장1, 놀이터1, 소공원1	3,269	90
난민촌 2 (서노,중노2)	도로개설6, 주차장2, 놀이터1, 소공원3, 경노당2	7,234	80
병 사 부 (남노송)	도로개설3, 경노당1	2,853	100
마당재 2 (중노1동)	도로개설5, 주차장1, 놀이터1, 경로당1	3,297	100
오 목 대 (교동)	소로개설3, 주차장1, 이주유도1, 법면정비1	4,972	80
공 수 내 (동·서서학동)	소로개설14, 주차장2, 경노당(휴게실)1, 녹지1	10,969	70
수 도 (동완산)	소로개설3, 놀이터1, 경로당1, 이주유도1, 법면정비1	2,996	90
용머리2 (서완산)	소로개설9, 주차장3, 놀이터2, 이주유도1, 법면정비1	7,686	90
용머리3 (서완산)	소로개설5, 주차장2, 놀이터1, 경로당1, 이주유도1, 법면정비1	5,459	90
효 정 (효자1,서완산)	소로개설10, 주차장1, 놀이터1, 경로당1, 소공원2	10,562	75
화 산 2 (중화산1)	소로개설6, 주차장1, 놀이터2, 휴게시설1	4,448	100
인후농원 (인후1)	공동주택 423세대 ·사업계획승인 : 2002. 2. 1	3,000	5
낙 수 정 (교동)	소로개설10, 주차장1, 놀이터1, 경로당1, 이주유도2, 상수도가압시설, 급.배수관교체	3,922	20

<도시 주거환경개선 2단계 사업추진>

□ 추진배경 및 개요

□ 2003.07.01부터 도시 및 주거환경정비법이 시행됨에 따라 계속적인

국고 지원토록 추가지구 선정

□ 개선효과가 큰 곳을 중심으로 사업대상 지구선정

□ 사전검토와 준비기간을 거쳐 2004년 사업계획을 수립하여 2005년

부터 5개년간 추진(2005년∼2009년)

□ 추진실적

□ 건교부 2단계 추진계획 시달회의 --------------- 2003.05.23

□ 세부추진계획 수립 및 통보(시∀구) ------------ 2003.05.29

□ 실태 및 사업예정지구 조사(2003.06.01 ∼ 06.30)

- 예정 대상지 선정 중 : 28개지구 (완산18,  덕진10)

□ 건설교통부 현지실사 ------------------------- 2003.08.21

- 국비확보상황을 고려 사업대상지구 확정 예상됨

(국비 50%, 교부세 10%, 시비 40%)

※ 사업지선정 확정통보 - 2003.12월말경

□ 이후계획

□ 소요예산액 : 400백만원(시비)

- 정비구역지정 및 개선계획 수립용역

□ 정비사업추진 ----------------------- 2005 ∼ 2009(5년간)

아름다운건축상 시상

아름다운 도시발전과 선진 건축문화 창달을 위해 미관 및 환경 등에

우수한 건축물을 선정하여 시상하므로써 도시미관 증진과 시민의

건축문화 이해로 전통문화 도시로서의  이미지 제고

□ 추진개요

□ 시상근거 : 전주시건축조례 제49조 (건축상)

□ 심사·시상시기 : 11월중 대상자 선정, 12월중 시상 (격년제)

□ 시상금 : 11,000천원

□ 신청대상 : 전주시 소재 건축물중 2000.01.01 ∼ 2003.10.31

준공된 건축물 (1회에 한하여 신청)

□ 신청자격 : 건축물 등의 설계자 또는 건축주

□ 시상내용

- 주거용 건축물 분야

- 일반 건축물 분야

- 전통한옥건축물분야

□ 심사위원 : 건축위원, 학계, 전문가, 공무원 등 9명 선정

□ 추진실적

□ 2003.10.15  : 건축상 응모공고

□ 2003.10.15∼11.12 : 응모원서교부 및 접수

□ 2003.11월말 : 당선작 선정 및 발표

□ 이후계획

□ 2003.12월중 : 건축상 시상

농촌지역 주거환경개선사업

도·농간 지역균형발전으로 열악한 농촌 주거환경 기초시설을 확충

하여 질적 수준 향상 도모

□ 사업개요

□ 농촌지역 중장기 개발 기본계획 수립을 위한 용역

- 농촌지역 중장기개발 계획 수립

- 중장기 계획에 의한 부분별 단위사업 추진

- 도로, 상·하수도 등 생활기반시설 수립

□ 농촌 주거환경개선 사업

- 마을기반시설(도로포장, 하수도등)

□ 사업기간 : 2003 ∼ 2004

□ 사 업 비 : 131백만원

□ 추진실적

□ 농촌지역 중장기 개발 기본계획 용역

- 착공 : 2003.06.26         - 준공예정일 : 2004.04.15

- 농촌지역 210개마을중 130개마을 조사완료

□ 농촌주거환경 개선(마을정비)사업

- 농촌주거환경개선 사업 지구지정 -------------  2003.04.23

- 농촌주거환경개선 사업계획 4개소 제출(시∀도) -- 2003.09.01

※ 완산구 동서학동 원색장, 삼천3동 용산,

덕진구 우아2동 삼천, 호성동 오메마을

□ 이후계획

□ 농촌주거환경개선사업 중앙부서(행자부)확정 ---- 2003.12월중

□ 농촌지역 중장기개발 기본계획 용역 완료 ------- 2004.04.15

□ 농촌주거환경 개선(마을정비)사업 중앙확정(행정자치부)후 사업시행

도 로 과 소 관

□	자 전 거 타 기 활 성 화 사 업	/	25
□	자 전 거 도 로 확 충	/	26
□	남 천 로 (전 주 천 좌 안 도 로) 확 장	/	27
□	장 승 백 이 길 (남 부 순 환 도 로) 개 설	/	28
□	대 학 로 개 설 및 확 장	/	29
□	녹 두 길 (전 주 진 입 로) 확 장	/	30
□	원 대 한 방 병 원 ∼ 가 련 교 간 도 로 개 설	/	31
□	견 훤 로 개 설	/	32
□	동 산 고 가 교 접 속 도 로 확 충	/	33
	체 전 대 비 도 로 정 비 사 업	/	34
	중 앙 분 리 대 (화 단) 설 치	/	35
	도 로 시 설 물(교량 등) 정 밀 안 전 진 단 추 진	/	36
	교 통 안 전 시 설 물 확 충 및 정 비	/	37
	교 통 사 고 잦 은 곳 구 조 개 선	/	38
	교 통 시 설 물 집 약 화 사 업	/	39
	초 등 학 교 통 학 로 설 치 공 사	/	40

자전거타기 활성화 사업

□ 자동차 1천3백만대 시대의 심각한 도시교통·환경·에너지 문제 개선

□ 녹색환경도시 건설을 위한 시민의식 전환운동 전개로 자전거이용 활성화

□ 추진계획

□ 자전거동호회 결성 및 활성화 : 44개회 1,200명

- 동 40개회 1,000명, 단체 2개회 100명, 대학 2개회 100명

□ 자전거이용시범학교 확대지정 : 17개교 ∀ 20개교

□ 주부자전거교실 운영 : 2개소(완산 거마공원, 덕진 종합경기장)

□ 초·중학생 자전거 안전교육 실시 : 년 6회 1,500명정도

□ 자전거타기 대행진 실시 : 3회

□ 주말자전거여행 실시 : 20회(4∼6월, 9∼11월)

□ 추진실적

□ 동별 자전거동호회 결성 및 활성화 : 40개(회원 : 950명)

- 효자3, 서신, 우아2동 등 15개동 활성화

- 기타 동은 다소 미흡한 편임

□ 자전거이용 시범학교 확대지정 : 3개교(서중, 중앙중, 솔빛중)

□ 주부자전거 교실운영 : 2개소(완산 거마공원, 덕진 종합경기장)

□ 주말자전거여행 실시 : 15회

□ 자전거타기 대행진 실시 : 2회 2,600명

□ 전주시민 자전거대축제 실시 : 1회 4,000명

□ 이후계획

□ 동별 자전거동호회 활성화 : 매주 1회 자전거타기 실시

□ 주말 자전거테마여행 실시 : 2회

□ 주부 자전거교실 운영 : 2개소

자전거도로 확충

□ 자전거이용자의 안전과 편익증진 및 녹색환경도시 건설

□ 자전거레저도로 개발로 자전거타기 적극적인 파급효과 도모

□ 주변 명승지를 연계한 하이킹코스 개발로 시민 여가활동 편익증진

□ 사업개요

□ 내    용 : 3개노선 11□(만경강 4, 삼천 5, 전라선 폐철도부지 2)

□ 사 업 비 : 1,100백만원(국 550, 시 550)

□ 사업기간 : 2003.03 ∼ 12월

□ 추진실적

□ 전라선 폐철도부지 자전거 레져도로 개설완료 -------- 2003.11

□ 만경강, 삼천 자전거하이킹도로 설치협의(하수과) ------ 2003.07

- 사업시행시기, 추진방법, 포장공법 등 추진방안 협의

□ 이후계획

□ 만경강, 삼천 자전거하이킹도로 사업추진 -- 2003.12∼2004.06

- 만경강 생태하천조성 및 삼천 자연하천조성사업과 병행추진

남천로(전주천 좌안도로) 확장

□ 사업개요

□ 위    치 : 동서학동 한벽교 ∼ 서신동 서신교(시의국도 1, 27호선)

□ 사 업 량 : 연장 4,150m, 폭 8∼12 ∀ 25m

□ 사 업 비 : 79,390백만원(기투자 27,576백만원)

□ 사업기간 : 1998 ∼ 2007(10개년)

※ 완산교∼서신교(연장 2,140m ― 47,890백만원)구간은 2단계로 추진

	2003계획
□ 위 치 : 매곡교 ∼ 완산교 □ 사 업 량 : 연장 520m, 폭 12.5 ∀ 25m □ 사 업 비 : 2,457백만원

□ 추진실적 ∀ 전체공정 89.0%

□ 초록바위 ∼ 매곡교간(L=220m) 도로완공 ---- 2003.05

□ 매곡교 ∼ 완산교간(L=540m) 4차공사 추진중(현공정 80%)

□ 초록바위 대절토구간 생태계 조기복원방법 협의(환경단체)

□ 이후계획

□ 매곡교 ∼ 완산교간(4차) 공사마무리 ---------- 2003.12

□ 초록바위 대절토구간(200m)공사시행 ---------- 2004.01∼12

□ 2단계(완산교∼서신교 L=2,140m)추진 ------- 2003∼2007

장승백이길(남부순환도로) 개설

□ 사업개요

□ 위    치 : 동서학동 좁은목 ∼ 효자동 금구선(시의국도 5호선)

□ 사 업 량 : 연장 7,250m, 폭 35m

□ 사 업 비 : 114,579백만원(기투자 69,679백만원)

□ 사업기간 : 1988 ∼ 2007(20개년)

	2003계획
□ 위 치 : 서서학동 공수교 ∼ 거산황궁APT □ 사 업 량 : 연장 615m, 폭 35m □ 사 업 비 : 2,100백만원

□ 추진실적 ∀ 전체공정 75%

□ 도시계획(도로선형) 변경절차 이행완료  --------- 2003.05.21

□ 기본 및 실시설계용역 완료  ------------- 2001.11∼2003.08

□ 공사발주(공수교∼거산황궁맨션) ---------------- 2003.08.30

□ 시공업체선정 ---------------------------------- 2003.11.08

□ 이후계획

□ 1차공사 추진(공수교∼거산황궁) --------- 2003.11∼2004.06

□ 2차공사추진(공수교 부근) ------------------------- 2004.01

- 용지매입 및 지장물 철거

□ 공사시행 ------------------------------------- 2004∼2007

대학로 개설 및 확장

□ 사업개요

□ 위    치 : 금암동 사대부고 ∼ 덕진동 도립국악원

□ 사 업 량 : 연장 2,330m,  폭 25 ∼ 35m

□ 사 업 비 : 23,441백만원(기투자 20,950백만원)

□ 사업기간 : 1995 ∼ 2005(11개년)

	2003계획
□ 위 치 : 송천삼거리 ∼ 연화마을 ∼ 어린이회관 □ 사 업 량 : 연장 220m, 폭 14 ∀ 25m □ 사 업 비 : 1,985백만원

□ 추진실적 ∀ 전체공정 81%

□ 송천교 교차로 PC암거(9차) 공사추진중(현공정 85%)

- 교통처리계획협의(북부서, 안전관리공단) ----------- 2003.06

- 주민공청회 개최(20명)  -------------------------- 2003.06

※ 공사일시 중지(국유지 무상사용 미협의) ---------- 2003.06.02

□ 국유지 사용(전북대부지)협의완료  ----------------- 2003.11

□ 이후계획

□ 국유지사용 협약체결  ----------------------------- 2003.11

□ 하천 횡단Box(4.0×2.5) 시공  -------------------- 2003.12

□ 연화마을∼어린이회관(220m)공사추진 --- 2003.11∼2004.06

□ 어린이회관∼송천삼거리길 확장공사 시행 ----------- 2005.12

녹두길(전주진입로) 확장

□ 사업개요

□ 위    치 : 원대한방병원 ∼ 팔복동 BYC입구

□ 사 업 량 : 연장 1,360m,   폭 35m ∀ 50m

□ 사 업 비 : 17,000백만원(국비 5,000, 양여금 7,200, 시비 4,800)

□ 사업기간 : 1999 ∼ 2005(7개년)

	2003계획
□ 위 치 : 원대한방병원 ∼ 추천대교 □ 사 업 량 : 연장 560m, 폭 35 ∀ 50m □ 사 업 비 : 1,200백만원

□ 추진실적 ∀ 전체공정 44%(투자액 : 6,800백만원)

□ 용지매입완료 : 원대한방병원∼추천대교 560m -- 1999∼2003

□ 이사비 지급 : 원대한방병원∼추천대교 560m -- 2001∼2003

□ 1차공사 착수(원대한방병원∼추천대교 560m) ----- 2002.12

□ 육교철거에 따른 주민공청회 개최  ---------------- 2003.06

- 횡단보도 2개소로 대체설치(보행자 신호등 포함)

□ 1∼3차공사 준공  -------------------------------- 2003.12

□ 이후계획

□ 2차공사(추천대교∼팔복동BYC 650m)추진 -- 2004.01∼2005

- 용지매입 및 지장물 철거

- 공사시행

원대한방병원∼가련교간 도로개설

□ 사업개요

□ 위    치 : 원대한방병원 ∼ 덕진동 가련교간(대로1류 17호선)

□ 사 업 량 : 연장 1,150m, 폭 35m

□ 사 업 비 : 18,200백만원

□ 사업기간 : 2001 ∼ 2006(6개년)

	2003계획
□ 기본 및 실시설계 용역완료 - 사 업 량 : 연장 1,150m, 폭 35m - 용 역 비 : 260백만원 - 용역기간 : 2002.12.27 ∼ 2003.10.30

□ 추진실적 ∀ 전체공정 17%

□ 기본 및 실시설계 착수  ------------------------- 2002.12

□ 하가지구택지개발관련 통과도로협의(토지공사) ---- 2003.04.30

□ 원대한방병원 옆 가련산 통과방법 결정(open cut) - 2003.08.06

- 전주시 설계자문 소위원회 개최

□ 이후계획

□ 사전 환경성 검토협의(전주지방 환경청)  -------- 2003.11

□ 기본 및 실시설계 완료  ------------------------ 2003.12

□ 용지매입 및 공사시행   ------------------------ 2004∼2006

견훤로 개설

□ 사업개요

□ 위    치 : 중노송동 마당재 ∼ 교동기린로(리베라 호텔앞)

□ 사 업 량 : 연장 1,650m, 폭 20 ∼ 30m, 터널 160m

□ 사 업 비 : 27,000백만원(시비)

□ 사업기간 : 1999 ∼ 2007(9개년)

	2003계획
□ 편입토지 및 지장물 보상추진 - 위 치 : 기린봉Ｄ ∼ 농원마을간(터널사업 L=120m) - 사 업 량 : 토지 40필지 5,165□, 지장물 28건, 이주대책비 30세대 - 사 업 비 : 1,920백만원

□ 추진실적

□ 농원마을 토지 및 지장물 보상(공정 95%) --------- 2003.04

- 토  지 : 40필지 5,165□

- 지장물 : 28동

- 이주비 : 30세대

□ 쌈지공원 조성공사 완료  ------------------------- 2003.11

□ 농원마을 지장물철거 및 폐기물처리 착수 ---------- 2003.11

□ 이후계획

□ 편입토지 및 지장물 보상 마무리  ----------------- 2003.12

□ 농원마을 지장물 철거 및 폐기물 반출 완료 -------- 2004.03

□ 도시계획 변경(선형 폭)마무리  ------------------- 2004.11

□ 용지매입 및 공사마무리(농원마을∼기린로) -------- 2007.12

동산고가교 접속도로 확장

□ 사업개요

□ 위    치 : 동산동 동산고가교 ∼ 동산역

□ 사 업 량 : 연장 340m,  폭 18.5 ∀ 35m

□ 사 업 비 : 2,990백만원(시비)

□ 사업기간 : 2003 ∼ 2005(3개년)

	2003계획
□ 사 업 량 : 연장 340m, 폭 18.5 ∀ 35m □ 사 업 비 : 200백만원(시비)

□ 추진실적 ∀ 전체공정 6%(투자액 200백만원)

□ 현장조사 측량, 편입토지 및 지장물 조사완료 ------- 2003.07

□ 편입토지 감정평가 및 보상협의  ------------------- 2003.08

□ 이후계획

□ 편입토지 보상완료  ------------------------------- 2003.12

□ 실시설계 용역시행  ------------------------------- 2004.04

□ 공 사 시 행  --------------------------------- 2004∼2005

체전대비 도로정비사업

2003년 전국체전에 대비하여 주요도로를 깨끗하게 정비함으로써

전주를 찾는 선수 및 관광객에게 쾌적한 이미지를 제공하고 시민

편익 증진에 기여

□ 사업개요

□ 사업대상 : 주요간선도로 10개노선 19.0□

□ 정비내용

- 균열씰링보수, 부분보수, 로드컷팅후 덧씌우기, 전면덧씌우기 등

□ 사 업 비 : 2,000백만원(도비 550, 시비 1,450)

□ 추진기간 : 2003.03 ∼ 10

□ 추진실적 ∀ 현공정 100%

□ 도로정비 완료 : 10개노선 19.0□

- 완산 : 5개로선  5.6km

(가리내길1.5 용머리길2.0 남원선1.0 전주대입구0.3 역천로0.8)

- 덕진 : 5개로선 13.4km

(백제로3.3 안덕원길2.0 공단로1.0 동산로1.1 호성로6.0)

□ 이후계획

□ 지속적인 도로유지관리 및 정비사업을 통하여 시민불편사항 해소

중앙분리대(화단) 설치

무단횡단 및 중앙선 침범 등으로 인명사고가 빈번하게 발생함에 따라

이를 사전방지하고 안전한 차량통행 및 녹색환경 도시건설을 위함

□ 사업개요

□ 사 업 량 : 3개노선 4.3□

- 중앙화단 : 1개노선 2.0□(녹두길)

- 방 호 형 : 2개노선 2.3□(진안선 2.0,  남원선 0.3)

□ 사 업 비 : 1,200백만원(국비 600,  시비 600)

□ 사업기간 : 2003.06 ∼ 12

□ 추진실적 ∀ 현공정 80%

□ 공사완료 : 2개노선 2.3□(진안선, 남원선)

□ 공 사 중 : 1개노선 2.0□(녹두길)

□ 이후계획

□ 녹두길 중앙화단 설치 완료  --------------------- 2003.12

□ 국비지원 사업으로 4차선이상 도로 등 중앙분리대 설치 가능도로

연차적 설치

- 중앙선 침범과 무단횡단으로 인한 교통사고 사전예방

도로시설물(교량 등) 정밀안전진단 추진

□『시설물 안전관리에 관한 특별법』의 정밀안전진단대상 시설물에 대하여 법적 의무사항 이행

□ 도로시설물중 정밀안전점검 대상시설물에 대한 점검결과에 따라 적정한 보수·보강을 함으로써 재난 안전사고 사전예방

□ 사업개요

□ 정밀안전진단 :  4개소(시·특법대상 1종교량 2개소, 절개지 2개소)

□ 정 밀 점 검 : 16개소

- 교     량 : 14개소(시·특법 2종교량 4개소, 일반교량 10개소)

- 복개구조물 :  2개소(조두천, 노송천 일부구간)

□ 사   업   비 : 325백만원

□ 추 진 기 간 : 2003.04 ∼ 12

□ 추진실적 ∀ 현공정 90%

□ 도로시설물 일제점검을 실시 대상시설물 선정 ----- 2003.04

□ 정밀안전진단 및 정밀점검용역추진 ------------ 2003.06.24∼

□ 이후계획

□ 용역준공  -------------------------------------- 2003.12

※ 정밀안전진단 결과에 따라 보수·보강사업 추진 -- 2004.상반기

교통안전시설물 확충 및 정비

□ 교통안전시설 확충으로 안전하고 쾌적한 교통환경을 조성

□ 교통약자인 보행자를 위한 편의시설 설치로 교통사고 예방

□ 사업개요

□ 사업위치 : 전주시내 일원

□ 사 업 비 : 1,998백만원(국비 883,  도비 35,  시비 1,080)

□ 사업기간 : 2003.01 ∼ 2004.02

□ 사업내용

- 차선도색 및 미끄럼 방지시설 : 90,000□

- 교통신호기 및 보행자 편의시설 설치 : 20개교차로

□신호등, 보행자조명등, 잔여시간표시기 설치 및 노후신호 등 교체

- 교통안전시설물 설치 및 보수(반사경,표지판,규제봉등) : 3,100개

- LED신호등 교체 : 25개교차로 300개소

- 교통신호제어기 차광막 정비 : 100개소

□ 추진실적

□ 차선도색(85,600□) : 공정 95%

□ 교통신호기 및 편의시설 설치 : 공정 95%

□ 교통안전시설물 설치 및 보수 : 공정 95%

□ 교통신호제어기 차광막 정비  : 100%

□ LED신호등 교체(전액국비) 설계완료

□ 이후계획

□ LED 신호등 교체공사 발주 ------------------ 2003.11

※ 공사단가계약으로 민원요구 및 불편지역 지속추진

교통사고 잦은곳 구조개선 및 어린이 보호구역 정비

□ 교통안전과 관련한 교통사고 잦은곳 지속적인 개선

□ 어린이 교통사고 예방을 위한 교통안전시설 정비

□ 교통사고 예방으로 인명 및 재산피해 최소화

□ 사업개요

□ 대상사업

- 교통사고 잦은곳 : 완산구 효자동 서부시장 삼거리외 24개소

- 어린이보호구역 정비 : 완산구 중앙초교외 4개교

□ 사업내용 : 교통섬 설치, 횡단보도 위치조정, 안전표지판 확충,

신호등 위치조정 및 주변시설 집약화 등

□ 사 업 비 : 2,379백만원(국비 1,189.5, 시비 1,189.5)

- 교통사고 잦은곳 : 1,755백만원

- 어린이보호구역정비 :   624백만원

□ 추진실적

□ 중앙초교 어린이보호구역 개선시범사업 완료

□ 교통사고 잦은곳 구조개선공사 착공(80%) ------ 2003.07.18

□ 중인초교외 4개교 어린이보호구역 개선사업  실시설계용역

(전북지방경찰청)  ---------------------------- 2003.08.12

□ 이후계획

□ 어린이 보호구역 개선사업 발주  --------------- 2003.12

교통시설물 집약화사업

가로시설물 집약화로 보행공간 확대 및 가로환경 개선으로

쾌적한 도시미관 기여

- 보행자 중심의 시설물 집약화

□ 사업개요

□ 대상사업 : 24개노선 250개 교차로 680개소

- 신호등주에 근접한 가로등, 교통안내표지판 등 집약 병행설치

□ 총소요사업비 : 4,000백만원

□ 사업기간 : 2002.02 ∼ 2005.12(4년)

- 1단계 계획(2002) : 5개노선 50교차로 130개소(1,000백만원)

- 2단계 계획(2003) : 7개노선 45교차로 200개소 (900백만원)

·도비 450, 시비 450

- 3단계 계획(2004) : 12개노선 120교차로 350개소(2,100백만원)

□ 추진실적

□ 공사 착공(95%)  --------------------------  2003.07.18

□ 이후계획

□ 공사 완료  --------------------------------  2003.12

초등학교 통학로 설치공사

□ 통학로 불법 주·정차 및 통과차량 과속으로 인한 교통사고 위험 상존으로 보행하는 어린이들이 불안과 불편속에 보행

□ 보행권확보(보도설치)로 인한 학부모들 마음놓고 학교 보내기 행정써비스 제공

□ 사업개요

□ 근거 : 어린이보호구역의지정및관리에관한규칙제3조(보호구역지정)

- 어린이 보호구역으로 지정된 정문을 중심으로 학생들의 통행량이 비교적 많은 학교 담장 주변의 보도 미설치 지역

□ 시관내 초등학교 : 59개학교

- 안전시설 기확보 완료 : 31개 학교

- 안전시설 설치불가 : 12개 학교

· 도로폭 협소 및 도로개설 예정지구는 추후 병행추진

- 어린이보호구역 미 지정 제외 : 10개 학교

- 금회 보도설치 대상 : 6개 학교

□ 추진실적 ∀ 완료

□ 사업대상(6개소) : 전주동, 동신, 서문, 서원, 송천, 금평초등학교

□ 사업내용 : 보도설치(투수콘 포장)  L=877m, B=1.5∼2m

□ 사업기간 : 2003.07.16 ∼ 10.22

□ 사 업 비 : 195백만원

교 통 과 소관

□  시 내 버 스 노선체계조정   / 42

□  시내버스 정보화구축사업   / 43

□  택시 중기수급계획 수립  / 44

□  도  심   주  차  장   조  성   / 45

□  가련산공원 주차장 조성 / 46

□  교 통  편 익 시 설   정 비   / 47

시내버스 노선체계 조정

□ 시내버스 노선체계의 합리적 조정으로 운영효율성 극대화

□ 이용 시민에 대한 서비스 향상 및 대중교통 기능 활성화 도모

□ 사업개요

□ 시내버스 노선체계 이원화 및 환승체계 구축 : 간선. 지선버스

- 간선 : 전주 ∼ 면소재지      - 지선 : 면소재지 ∼ 마을

□ 노선수 대폭 축소와 장거리 노선단축으로 노선별 배차간격 축소

- 노선수 : 241개노선 ∀ 112개노선 (간선55, 시내52, 지선5)

□ 노선번호 체계정비 : 식별이 용이하도록 방향성, 고유성 부여

□ 그동안 추진상황

□ 노선체계개편 용역(교통개발연구원, 삼안기술) -- 2001.12∼2003.02

□ 노선체계 개편안 설명회 개최 및 의견수렴 ------- 2003.02∼05

□ 노선체계개편 추진협의회 개최(2회) ------ 2003.04.16·05.27

□ 개편시행에 따른 완주군·김제시 동의요청 --------- 2003.06.07

- 동의회신 : 김제시(2003.07.01),  완주군(2003.10.15)

□ 개편시행 인가 및 시행준비 ------------------- 2003.10∼12

□ 이후 추진계획

□ 노선개편 시행준비 마무리 -------------------- 2003.11∼12

- 회차지 설치, 하차단말기 설치, 행선판 및 승강장표지판 정비 등

□ 시내버스 노선개편 홍보 ----------------- 2003.11.20∼12.31

- 시내버스 차량에 노선안 게첨 운행 및 유개승강장 노선안 게첨 : 11월중

- 팜프렛 제작 배포 : 2종류(게시용, 포켓용) 10만부

·각 동, 학교, 노인정, 아파트관리사무소 , 주민 밀집지역 등

- 신문, 방송, 언론매체를 통한 지속홍보

□ 시   행 --------------------------------- 2004.01.01

시내버스 정보화 구축사업

시내버스 운행과 관련된 각종 정보의 실시간 제공 및 효율적인

운행관리를 통해 대중교통 서비스 향상 및 이용 활성화 도모

□ 사업개요

□ 사업내용

- 버스정류장 안내 단말기 : 100개소

- 버스내 안내단말기 : 94대

- 노변기지국 : 177개

- 출발전 및 기본 교통정보제공 단말기(kiosk) : 11개소

□ 사 업 비 : 3,460백만원

□ 사업기간 :	2003.10∼2004.04(6개월)

□ 그동안 추진상황

□ 전문가 자문회의 개최(도입시스템 및 사업계획 검토) ---- 2003.06.10

□ 국비(특별교부세) 확보(6억원) ----------------- 2003.07.16

□ 사업발주 의뢰(조달청) ------------------------ 2003.07.30

□ 계약체결(서울통신기술 주)--------------------- 2003.10.07

□ 사업착공 ------------------------------------- 2003.10.16

□ 이후 추진계획

□ 시스템 구축 및 개발 ------------------- 2003.10∼2004.02

□ 시험운영 및 사업완료 ------------------ 2004.02∼2004.04

□ 상용서비스 실시 ----------------------- 2004.04

택시 중기수급계획 수립

교통여건 및 교통수단의 다변화와 자가용승용차 급속한 증가에

대응하여 합리적인 택시 수급관리로 선진 교통제도 정착

□ 사업개요

□ 주요내용

- 택시 중기(5개년) 수급계획 및 전망

- 택시제도의 발전방향 제시 및 서비스 개선대책 수립

□ 용 역 비 : 20백만원

□ 그동안 추진상황

□ 용역과업 수행을 위한 이해관계자 의견 수렴 ----- 2003.05∼06

- 개인택시조합, 법인택시조합, 법인택시노조 등

□ 용역시행 ------------------------------------- 2003.10∼12

□ 이후 추진계획

□ 용역결과에 의한 택시 중기수급계획 확정 ------- 2003.12

- 개인택시 증차계획, 택시업체 경영개선 및 서비스 개선대책 등

□ 시     행 ----------------------------------- 2004.01.01이후

도심주차장 조성

자동차의 급증에 따라 날로 심화되고 있는 도심지역 주차난을 해소하고,

엄정한 주차질서 확립으로 교통소통 원활 도모

□ 사업개요

□ 위    치 : 전주시 완산구 고사동 11-8번지외 3필지

□ 규    모 : 부지 1,738□(526평), 주차수용  202대

□ 사 업 비 : 4,351백만원 (토지매입 3,393, 공사비 958)

□ 사업기간 : 2001.10 ∼ 2003.04

□ 그동안 추진상황

□ 공 사 발 주 ----------------------------------- 2001.12.29

□ 주차장 준공 ----------------------------------- 2003.04.10

□ 주차장 개방 ----------------------------------- 2003.04.15

□ 전주시주차장 조례 개정 ------------------------ 2003.06.21

※ 주차장 이용실적(2003.05.05∼10.31)

- 이용대수 : 60,000대(일반46,000대, 걷고싶은거리 상가14,000대)

- 주차요금 징수 : 75,000천원

가련산공원 주차장 조성

가련광장 주변지역 주차난 해소 및 교통소통을 촉진시키고,

가련산공원 이용객에게 주차편의 제공.

□ 사업개요

□ 위    치 : 전주시 덕진구 덕진동 2가 224-3번지외 8필지

□ 규    모 : 부지 2,595□(785평),  주차능력 56면

- 편입토지 : 시유지696, 국유지369, 사유지1,530

□ 사업기간 : 2003.06∼2004.06

□ 총사업비 : 712백만원(토지매입130. 공사비582)

※ 2003년 예산 확보 : 200백만원

□ 그동안 추진상황

□ 주차장부지 일부(696□) 매입 ------------ 1994.01.10

- 국유지(재무부) 369□ 포함 1,065□ 확보

□ 가련산 공원주차장 시설계획 수립 --------- 2002.04.26

□ 미 매입토지(6필지/1,530□) 감정 재평가 --- 2003.06.16

□ 실시설계 완료 및 사업시행 인가  --------- 2003.07.18

□ 이후 추진계획

□ 토지매입 (6필지) ------------------------ 2003.07∼2004.03

□ 공사발주 -------------------------------- 2004.04

□ 착    공 -------------------------------- 2003.04

□ 준    공 -------------------------------- 2005.06

교통 편익시설 정비

대중교통 이용시민의 편익제공으로 대중교통 이용을 활성화하고

쾌적하고 질서있는 교통환경 조성

□ 사업개요

□ 사업내용

- 시내버스 승강장 정비 : 771개소(유개승강장 393개소 : 51.0%)

· 유개승강장 신설 및 정비 : 신설 32. 정비 80개소

- 시외·고속터미널 환경 정비 : 6개소(완산3, 전동1, 터미널도색2)

- 간이승강장 화장실 정비 : 2개소(노송1, 덕진1)

□ 사 업 비 : 379백만원(시비 289, 도비 90)

□ 사업기간 : 2003.03∼2003.09

□ 그동안 추진상황

□ 현 지 조 사 ------------------------------------ 2003.02

□ 시내버스 승강장설치 공사 착공 ------------------ 2003.04.21

□ 시외·시내버스 승강장 정비 착공 ---------------- 2003.07.21

□ 시외·시내버스 승강장 정비 완공 ---------------- 2003.09.18

□ 시내버스 승강장 설치 완공 ---------------------- 2003.10.30

하 수 과 소관

□ 하수처리장 3단계(1차) 증설사업 □ 하수처리장 1·2단계 고도처리 사업 □ 화산처리구역(용머리길주변)하수관거 정비사업 □ 연화천 차집관거 시설공사 □ 금암동주변 수해우심지역 하수관거 정비사업 □ 화산·덕진처리구역 하수관거 정비공사 □ 하수처리장 슬러지 처리시설 공사 □ 반암과선교밑 하수관거 정비사업 □ 삼천 자연형하천 조성사업 만경강 생태하천 가꾸기 사업 객사천(소하천) 샛강 살리기 재난·재해 사전대비	/ 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60

하수처리장 3단계(1차) 증설사업

도시인구 증가및 도시규모 확대로 하수발생량이 급속히 증가함에

따라 처리시설을 확충해 수질을 개선하고 환경을 보호

※ 시설규모 : 303천톤/일 ∀ 403천톤/일

□ 사업개요

□ 시설용량 : 100,000□/일

□ 사업기간 : 1998 ∼ 2004년 (6년)

□ 사 업 비 : 69,573백만원(양 32,476  지방비 26,497 민투 10,600)

※ 2003년사업비 : 14,461백만원(양 5,175   도 7,309   시 1,977)

□ 추진실적(공정45%)

□ 민간위탁 협약   --------------------------------  2002.02

□ 착         공   --------------------------------   2002.05

□ 공사추진내용

- 유입침사지, 생물반응조, 벽체콘크리트 타설

- 1단계 악취방지시설 완료

□ 이후계획

□ 토목·건축공사 -----------------------------------  2003.12

※ 2003년 말까지 80% 추진

□ 기계·전기·계장 조경공사 추진 ------------------  2004.08

□  시운전 및 완공 ----------------------------------   2004.11

하수처리장 1·2단계 고도처리 사업

2001년 9월 하수도법 개정으로 방류 수질기존이 강화되어 기존

하수처리장 1·2단계 303천톤의 시설에 대하여 고도처리사업을

완료하여 만경강 수질개선

□ 사업개요

□ 사업규모 : 기존 1·2단계 고도처리사업 303,000□/일

□ 사업기간 : 2002.02 ∼ 2005.12

□ 사 업 비 : 42,980백만원(양 21,490. 도 10,745. 시 10,745)

※ 2003사업비 : 18,500백만원(양 8,528. 도 8,794. 시 1,178)

□ 추진실적

□ 기본계획 및 입찰안내서 작성 용역  ------- 2002.06∼2003.02

□ 기본계획 및 입찰안내서작성용역 환경부자문완료 ----- 2003.06.05

□ 기본계획 및 입찰안내서 작성용역 인가(환경부) ----- 2003.11

□ 기본계획 및 입찰안내서 용역 준공 ----------------- 2003.11

□ 고도처리사업 일괄 입찰 고시 ---------------------  2003.11

□ 이후계획

□ 참가업체 제안서 접수 및 선정 --------------------  2003.12

□ 1·2단계 고도처리사업 착공 ----------------------   2004.07

화산처리구역(용머리길주변) 하수관거 정비사업

수해상습지인 용머리길주변 하수관거정비로 재해를 사전에 예방

하고 기존 우·오수관을 분리 시설함으로써 하천수질개선과 시민

보건위생 향상에 기여

□ 사업개요

□ 구    간 : 서완산동 용머리재 ∼ 효자3동 우림교간

□ 사 업 량 : 연장 9.7□ (우수 2.3□   오수 7.4□)

□ 사업기간 : 2000.06 ∼ 2003.05(3개년간)

□ 사 업 비 : 7,000백만원(양3,500.  시3,500)

□ 추진실적 (공정 100%)

□ 1·2차분 준공   --------------------------------- 2002.08

- 우·오수관 6.09□ 완료

□ 3차분 착공   ------------------------------------  2002.08

□ 공사추진내용

- 오수관 지하굴진 잔여분(140m) 시공 -----------  2003.03

- 우·오수관 오픈구간(784m) 잔여분 시공 -------  2003.03

- 준   공   -----------------------------------   2003.06.20

연화천 차집관거 시설공사

연화천 주변의 개발로 발생한 오수를 차집하여 하천오염원을 제거

하고 우·오수관을 분리시설하여 하천수질개선과 시민의 보건위생

향상에 기여

□ 사업개요

□ 구    간 : 대학로 ∼ 전주천

□ 사 업 량 : 차집관거 매설(연장 2.214□)   D=700∼800□

□ 사업기간 : 2002.06 ∼  2003.12

□ 사 업 비 : 1,020백만원(시비 1,020)

□ 추진실적 (공정 90 %)

□ 착   공   ---------------------------------------- 2002.06

□ 연화마을 오수관설치 완료(300m)------------------  2002.11

□ 대학로∼전북대후문 우·오수분리벽설치 완료(1,737m) ---- 2002.12

□ 덕암마을 오수관설치 완료(300m)------------------- 2003.06

□ 전북대후문 ∼ 송천로 오수관 완료(615m)----------- 2003.11

□ 송천로 오수관(30m) 설치(도로과와 병행시공)-------   2003.11

□ 이후계획

□ 준  공   ------------------------------------------ 2003.12

금암동 주변 수해 우심지역 하수관거 정비사업

기존 하수관거의 단면 부족으로 약간의 집중 호우시에도 도로 및

주택이 상승적으로 침수되어 이를 해소하고자 함.

□ 사업개요

□ 위    치 : 덕진구 금암동 주변

□ 사 업 량 : 연장 3.27□ (우수1.09□.  오수2.18□)

□ 사업기간 : 2001.12 ∼ 2004.12(3개년)

□ 사 업 비 : 3,327백만원(양1,631  시1,696)

※ 2003년 사업비 : 2,206백만원(양1,082  시1,124)

□ 추진실적 (공정 40%)

□ 실시설계 용역 ---------------------------- 2001.11~2002.09

□ 공 사  발 주 (1차분) -----------------------------  2002.10

□ 착        공 (1차분) -----------------------------  2002.12

□ 고속버스터미널앞 압입 시공중 ---------------------  2003.11

□ 시외버스터미널뒤 우·오수관 시공중 ---------------  2003.11

□ 이후계획

□ 시외버스 터미널∼기린로(519m) 우·오수관시공 --- 2003.12

□ 기린로 ∼ 금암초등학교(486m)우·오수관시공 ----- 2004.06

□ 준 공   ------------------------------------------ 2004.12

화산·덕진 처리구역 하수관거 정비공사

화산처리구역 하수관거정비 미실시구간과 하수관거 타당성조사

결과 합류식 지역중 시급한 덕진처리구역 하수관거를 우·오수

분리식으로 시설 개량하여 하천 수질개선 및 시민 보건환경에 기여

□ 사업개요

□ 위    치 : 화산1·4·7 처리구역 및 덕진 1 처리구역

□ 사 업 량 : 연장 56.4□

□ 사업기간 : 2002.11 ∼ 2006.12(4개년)

□ 사 업 비 : 18,650백만원(양9,325  시9,325)

※ 2003년 사업비 : 3,707백만원(양1,854  시1,853)

□ 추진실적

□ 기본 및 실시설계 용역 완료 -------------------------  2003.09

□ 이후계획

□ 화산처리구역 실시설계 완료구간 착공  -------------  2003.12

□ 덕진처리구역 착공   -----------------------------   2004.01

□ 준  공 ------------------------------------------   2006.12

□ 문제점

□ 시가지 도로굴착에 따른 민원 및 교통불편 예상

- 굴착으로 인한 민원 및 교통불편 최소화를 위한 가능한 한

지하굴진, 야간작업 및 비굴착공법으로 추진

하수처리장 슬러지 처리시설 공사

해양투기로 인한 해양오염 가중으로 하수슬러지 자원화 건조화 등

국내외 처리시설 현황 등을 기본설계시 연구 검토하여 하수슬러지

처리시설 최적의 방안 선택하여 추진

□ 사업개요

□ 위    치 : 하수종말처리장 내

□ 사 업 량 : 슬러지 발생량 150톤/일

□ 사업기간 : 2003.03 ∼ 2005.12(3개년)

□ 사 업 비 : 14,000백만원(양7,000  도3,500  시3,500)

※ 2003 용역비 : 722백만원(국 361  도180.5  시 180.5)

□ 추진실적 - 7.2억원 (국비 3.6 도비 1.8 시비 1.8)

□ 국비부담분 지방채발행 승인(행자부) ------------ 2003.03

□ 전주시의회 지방채발행 동의  -------------------  2003.06.21

□ 이후계획 - 132.8억원 (국비 66.4 도비 33.2 시비 33.2)

□ 기본 및 실시설계 용역  -----------------  2003.07∼2004.09

- 슬러지 처리시설의 공법 및 처리방법 결정

□ 설계심사 및 환경부 승인 -----------------------  2004.05

□ 공사 착수  ------------------------------------  2004.12

□ 준공 예정  ------------------------------------  2005.12

반암 과선교밑 하수관거 정비사업

우아동 장재마을 진입로상 반암 과선교의 통과구간 불합리로 시민불편

- 대형 차량의 통행제한 및 우천시 배수가 불량하여 상습 침수에

따른 집단민원 해소

□ 사업개요

□ 위    치 : 전주시 덕진구 우아동 반암 과선교

□ 사 업 량 : 하수도 L=150m  도로높이 조정 L=80m

□ 사업기간 : 2003.04 ∼ 2004.07

□ 사 업 비 : 200백만원(시비)

□ 추진실적

□ 조사측량 및 실시설계 완료------------------------  2003.05

□ 착           공 ---------------------------------  2003.08

□ 이후계획

□ 용 지 매 수 --------------------------------------  2003.12

□ 준       공 --------------------------------------  2004.07

삼천 자연형하천 조성사업

삼천 하천수질을 개선하고 생태환경이 살아 숨쉬는 자연형 하천

으로 가꾸어 시민들에게 더욱 친근한 휴식공간으로 제공

□ 사업개요

□ 구    간 : 삼천교 ∼ 추천대교

□ 사 업 량 : 연장 8.05□

□ 사 업 비 : 9,819백만원(양 6,027  지방비 3,792)

※ 2003년 사업비 3,350백만원 (양 2,850  시 500)

□ 사업기간 : 2000 ∼ 2005년(6개년)

□ 사업내용

- 수질개선(차집관거)L=1.4□   - 저수호안 L=3.76□

- 자전거도로  L=13.9□        - 조경식재 및 시설물 1식

□ 추진실적

□ 실시설계 1,2차사업 완료 -----------  2000.09 ∼ 2003.07

- 1차 : 차집관로 매설 (D=400□) : 1.4□

- 2차 : 자연형호안 649m, 낙차공 개량 3개소 , 중복천 수질정화습지 1개소

□ 책임감리 및 3차 사업 시행(공정49%) --- 2003.0 5∼2004.12

- 자연형 호안 : 1,007m, 자전거도로 : 1,612m

□ 이후계획

□ 4차공사 추진(전체공정 95%) -------  2004.07 ∼ 2005.07

□ 자전거도로 개설 완료 ---------------------------  13.9 □

□ 자연형 호안공 완료 -------------------------------  1.2 □

□ 조경공사 완료  -----------------------------------  1 식

□ 문제점 및 대책

□ 양여금에 대한 지방비(시비 35%)부담금 미확보로 양여금확보 지난        - 2004 소요액 : 4,290백만원(양여금 998.  시비 3,292)

※ 2001 ∼ 2003 시비 미확보액 : 2,754백만원(2004부담액 : 538백만원)

□ 시비 미확보액 2,754백만원 추경확보후 관계부처와 협의, 양여금 확보 추진

만경강 생태하천 가꾸기 사업

□ 하천 생태계의 건강성 회복을 위한 다양한 사업추진으로 수질

및 하천환경 개선

□ 주민에게 친숙한 휴식공간으로 조성 제공

□ 하천 환경개선을 전제로한 주변지구 개발

□ 사업개요

□ 위    치 : 전주시 추천대교 ∼ 조촌동 마산천 좌안(L=7.9□)

□ 하천구분 : 국가하천

□ 사업기간 : 2001 ∼ 2010년(10개년)

- 1단계사업 : 2001 ∼ 2006년(5개년)

- 2단계사업 : 2006년이후

□ 사 업 비 : 31,400백만원(국비 18,300.  지방비 13,100)

- 확보액 :  2,888백만원(국비 2,004.  도비 434.  시비 450)

□ 사업내용 : 자전거도로, 조경, 하천정비, 생태숲조성

□ 추진실적

□ 기본계획 수립 : 2001.02(전북도)

□ 실시설계 용역 : 2002.06 ∼ 2003.09(현대ENG, 대주기술공사)

□ 저수호안정비(L=1,758m) 공정95% ------ 2002.12~2003.12

※ 생태숲 조성(벗나무외 30종 13,164주) -------- 2003.04 완료

□ 하천공사시행허가 및 실시계획인가 협의 ------------ 2003.11

□ 이후계획

□ 저수호안 정비( L = 3,106m ) ------------------- 2004.12

□ 오염하천 정화사업(수제, 어도, 횃대, 조경) --------- 2005.12

□ 자전거도로(13.3□) 및 조경(휴식공간포함)공사추진 ---- 2006.12

□ 문제점 및 대책

□ 국·도비 지원에 따른 시비 미확보(219백만원)

- 2003년 추경 또는 2004년 본예산 확보

객사천(소하천) 샛강살리기

소하천인 객사천을 자연 친화적인 하천정비로 친수공간 확보로

주변환경 개선 및 재해시 주민의 생명 및 재산 보호

□ 사업개요

□ 위    치 : 전주시 완산구 대성동 ~ 색장동(전주천 합류)

□ 사업규모 : 자연형 하천 조성 L = 1.68□

□ 사업기간 : 2002 ∼ 2004

□ 사 업 비 : 1,700백만원(양여금 850 시 850)

- 2003년도 300백만원(양여금 150 시비 150)

□ 추진실적 (공정 - 2003년분 완공)

□ 하천정비 기본계획 수립 ------------------------  2001.12

□ 공 사 착 공 -----------------------------------  2002.12

□ 준       공  ----------------------------------  2003.06.21

※ 자연형 호안정비 L=275m, 낙차공 2개소

□ 이후계획

□ 부족사업비 1,400백만원(양여금 700.  시비 700) 확보 추진

- 2004년도 완공목표로 연차사업으로 추진

재난·재해 사전대비

□ 사전예방에 역점을 두는 안전관리로 피해 최소화

□ 상황발생시 신속 응급조치 후 항구 복구사업추진으로 시민생활

안정 도모

1. 재 난 대 비

□ 현황

□ 재난관리대상시설 지정현황                    (2003.11.현재)

구 분	총 계	중점관리대상시설				재난위험시설
		소계	A등급	B등급	C등급	소계	D등급	E등급
합 계	1,218	1,183	1,071	85	27	35	35	-
건축물	1,189	1,155	1,063	73	19	34	34	-
시설물	29	28	8	12	8	1	1	-

- D급 : (민간시설 건축물 34, 도로시설 1)

·민간시설 : 효자주공2단지(8동), 우진아파트(7동), 태광연립(2동),

태백주택(4동), 명륜연립(3동), 구)목원예식장,

남부시장, 삼천주공1단지(9동)

·도로시설 : 노송천 복개도로

□ 재난관리기금 확보현황(2003.11 현재)

(단위 : 백만원)

구 분	법 정 액	확 보 액	미확보액	사 용 액	사용잔액 (이자포함)
재난관리기금	1,110	1,110	0	103	1,077

□ 추진실적

□ 안전점검

- 중점관리대상시설(A, B, C등급) : 총1,183동 2회(상하반기)

- 재난위험시설(D, E등급) : 총 9개소 35동(월 1회)

□ 기초생활보장 및 장애인세대 생활시설(전기·가스·보일러)개선

- 장애인세대 등 가스자동안전기 설치 : 200세대 완료

- 기초생활보장 수급세대 가스시설 개선사업 : 230세대 완료

- 생활안전시설 개선사업(T/S기동반) : 1,000세대  완료

□ 전국체전대비 2003년도 긴급구조 종합훈련 실시(월드컵경기장)

- 2003.09.26  : 전주소방서외 27개 기관(700여명) 참여

□ 안전문화운동 추진

- 안전문화 캠페인 실시 : 11회   500여명 참여

- 중·고생 안전문화교육 실시   : 2회 2,000명

- 어머니 안전봉사대원 교육 실시 : 1회   300명

2. 재 해 대 책

□ 추진실적

□ 재해대책기금 현황                            (단위 : 백만원)

구 분	법 정 액	확 보 액	미확보액	사 용 액	사용잔액 (이자포함)
재해대책기금	5,042	3,654	1,388	539	3,372

□ 재해사전대비 추진

- 방재시설물 점검 : 155개소(하천제방 34, 저수지 67, 기타 54)

- 방재물자 확보 및 장비지정관리(포대,묶음줄등 11종 18,070점)

- 침수예상지역(농경지) 조치계획 수립

- 언더패스 및 주요간선도로, 둔치 주차장 담당공무원 지정 및 예찰활동 강화

□ 소규모재해위험시설 정비

- 현    황 : 13개소(270,404천원) 추진 완료

·재해대책기금 : 129,189천원(도로3, 낙석방지시설1, 축대1)

·예비비등기타 : 141,215천원(하천1, 절개지 6. 주택축대1)

□ 재해대책 본부 운영

- 기    간

·여 름 철 : 2003.06.15 ∼ 2003.10.15

- 근무체제

·평    시 : 2명(하수과 직원 24시간 근무)

·비 상 시 : 3단계로 구분 단계별 비상근무실시

□ 2003.07.25 집중호우에 따른 피해복구

· 호우일시 : 2003.07.25(금) 10:00∼11:00

· 강 우 량 : 97□(시우량 87□/hr 역대강우 3위)

- 피해발생 현황

□□ 사유시설 : 주택침수 49동,  농경지피해 0.43□

□□ 공공시설 : 총17개소(하천 4, 공원 6, 하수 5, 기타 2)

- 복구비 지원현황

·총복구비 1,646,777천원(국비 808,623 도비 335,261 시비 502,893)

□□ 사유시설 31,359천원(국비 30,894 도비 186 시비 279)

□□ 공공시설 1,615,418천원(국비 777,729 도비 335,075 시비 502,614)

※ 예산조치 : 국·도비 예산성립전 사용승인 및 시예비비 사용 집행

□ 공공시설 복구 추진현황

- 총17건 (공사착공 2, 발주중 6, 설계중 9 )

도시발전기획단소관

□ 전주서부신시가지 도시개발사업     /  64

□ 전  주  경  전  철   건  설     /  65

전주서부신시가지 도시개발사업

□ 전주시의 장기발전을 위한 도시공간 구조 개편

□ 전라북도의 경제,사회,문화,행정등 중심기능을 담당할 중핵 도시건설.

□ 전통문화와 최첨단 지원시설이 조화된 미래형 신시가지조성.

□ 사업개요

□ 위    치 : 전주시 완산구 효자동 일원

□ 규    모 : 87만평

□ 사 업 비 : 4,185억원

□ 사업기간 : 1999 ∼ 2006 (8개년)

□ 사업방식 : 도시개발법에 의한 도시개발사업(환지／수용)

□ 추진실적

□ 공사착공(1차-간선도로망 5개로선, 교량1기) ------ 2003.02.27

- 경찰청사주변 기반시설 완료 -- 2003.10월

□ 환지계획인가 및 환지예정지지정  ------------- 2003.07.15

□ 용지보상(1차-토지56필지,지장물15,400건,영업보상22건) --- 2003.04.28∼7.31

□ 체비지매각(총681필지중199필지 1,930억원,매각율29%) -- 2003.08∼10월

□ 이후계획

□ 용지보상추진(2차)  ----------------  2003.10∼2004.02.28

- 토지 346필지, 지장물 82,600건, 영업보상 29건

□ 기반조성공사추진   -----------------  2004.03∼2006.12.31

- 기반조성 76만평, 도로개설, 교량가설 3개소(삼천1·2교,이동교),옹벽 등

□ 체비지 매각(3차-346필지 1,630억원) --------  2003.12월중

□ 기타사업추진   ------------------------------  2004∼2006

- 문화재(문학대)이전, 조경, 전기, 문화재시굴조사, 폐기물처리 등

전 주 경 전 철  건 설

자동차의 급증과 도로시설 공급의 한계로 인하여 계속 심화되고 있는

도심지역의 심각한 교통난 해소 및 고품질의 대중교통서비스 제공

- 정시성, 안전성, 대량수송이 가능한 무공해 신 대중교통수단 도입 -

□ 사업개요

□ 시스템 및 노선연장 : 노면전차(Tram),  24.29□

- 1단계(2008) : 송천역∼경기장∼팔달로∼꽃밭정이네거리∼삼천농수산시장(14.19□)

- 2단계(2011) : 전주역∼곰솔나무길∼꽃밭정이네거리∼평화 3지구(10.10□)

□ 사 업 비 : 4,683억원정도(국비 945  지방비 986  민자 2,752)

□ 사업기간 : 2001∼ 2011(11년간)

□ 추진실적

□「전주경전철 건설·운영 기본계획」용역 완료 -------- 2003.02.15

□「경전철 건설·운영 기본계획 」용역 간담회 및 공청회 개최  ----- 2003.02∼03

- 시의회, 지역전문가, 시민단체, 동대표, 업계간담회 및 시민공청회 개최

□ 시민단체, 언론사 방문 경전철 홍보 --------------- 2003.03∼06

□ 경전철 홍보 VCR 제작 홍보시행(11,662회/273,627명) ---2003.0 7∼

□ 시의회 기본설계 용역비 사용 동의 ----------------- 2003.09.09

□ 국토연구원 부설 민간투자지원센터(PICKO)검토요청 -- 2003.10.01

□ 기본설계 용역 발주   ------------------------------ 2003.11.01

□ 이후계획

□ 대중교통 개선 민관협력협의체 구성 운영   ---------- 2003.11

- 전주시, 시의회, 운수업계, 시민단체, 언론사, 유관기관, 전문가 등

□ 도시철도기본계획승인요청 (전주시→전라북도) ------- 2003.12

□ 민간투자대상사업 지정 신청(기획예산처) ------------ 2003.12

□ 경전철 기본설계 착수   ---------------------------- 2003.12

차량등록사업소 소관

□ 수요자중심 친절봉사 행정구현 □ 자동차등록 창구업무개선 □ 건설기계 등록민원 서비스확대 제공 □ 자동차 정기검사 경과 안내 개선 □ 사업용자동차 정기점검 안내시행	/ 67 / 68 / 69 / 70 / 71

수요자 중심 친절봉사 행정구현

친절봉사 생활화로 민원인 편의를 도모하고 민원행정의 투명성 및

신뢰성을 확보하여 양질의 친절봉사 행정구현

□ 추진개요

□ One - Stop 민원처리로 주민편의 제공

- 자동차등록업무와 관련된 타 기관 사업소내 입주 운영

· 세무(완산,덕진구청)       · 지방세수납(전북은행)

· 지역개발공채(농협)

- 공무원 친절교육 :  주1회

- 민원안내 도우미 배치 :  1일2명

- 자원봉사자 민원안내  :  1일2명(오전, 오후)

□ 장애인 전담창구 개설운영(3급이하 장애인) : 등록업무 대행

□ 민원인을 위한 편의 도모

- 복사기1대, TV1대,자판기 2대,공중전화 2대, 민원실화장실보수 25,200천원

□ 백화점 수준의 친절도 완성

- 공무원 친절교육실시   ----------  64회 1,920명

- 민원안내 도우미 배치  -------------   연 360명

- 자원봉사자 민원안내  --------------   연 280명

□ 이후계획

□ 민원편의 시설 확충 - 공기청정기, 수족관, 증명발급인증기설치     □ 구내전화교환기 설치(담당자 직접 대화 가능) - 소요예산액:25,000천원

□ 무엇이든 도와주는 민원안내 창구 운영 -- 민원1일 담당제 실시

□ 지속적인 친절교육으로 친절한 대민서비스 추진

□ 자동차등록원부 발급기관 확대(차량등록사업소 및 각구·동 민원창구)

- 2004.01.01부터 실시

-  근 거 : 시·군·구 행정정보시스템의 민원행정 프로그램

자동차등록 창구업무 개선

자동차 등록민원이 폭주하여 민원처리가 지연되고 있는 실정으로

등록창구를 수요자 중심으로 개선하여 시민편익을 증진

□ 개 요

□ 자동차 등록창구 인원 : 8명 (창구 4명, 전산 4명)

□ 등록차량 :  2003.10.31현재  190,119대(9,302대 증가)

2002.10.31현재  180,817대

□ 추진실적

□ 차량등록민원처리 : 737,521건(1일 2,950건)

- 신규(12,923) 변경 및 저당(79,786)  말소.이전.압류(351,449)

증명발급 및 기타(293,363)

□ 등록 창구를  8개 창구로 확대(창구8명, 전산3명)

- 신규등록2, 저당설정말소·수출·변경등록2, 이전등록4 전담창구제 전환

- 민원접수 및 전산업무를 구분없이 창구에서 처리

- 대기시간 : 종전 → 2시간,   개선후 → 1시간

□ 이후계획

□ 전직원 철저한 업무연찬 실시로 풀(pool)시스템 운영

□ 신규차량 및 압류등록 등 폭증하는 행정수요에 대처

□ 부단한 자기 성찰로 신속 정확한 민원행정 처리

□ 효율적인 인력운영으로 밝은 직장 분위기 쇄신

자동차·건설기계 등록민원 서비스 확대 제공

자동차·건설기계 등록 업무에 관한 모든 자료를 전주시 홈페이지에

게재하여 민원인들이 편리하고 자유롭게 이용함으로써 신속정확한

등록 도모

□ 추진개요

□ 자동차·건설기계 등록에 따른 서식 민원실 비치 제공

- 직접 민원인이 방문하여 서류 양식을 가져감 : 일100건 정도

□ 자동차·건설기계 등록에 따른 구비 서류에 대한 전화 및 방문 문의 답변

- 일 200건 정도

※ 건설기계 대여회사 업체 수 : 45개소

〈구비서류 종류 : 신규. 이전. 등록사항변경. 저당권 등기타〉

□ 직접 방문하여 문의 및 등록 서식을 가져가므로 민원인의 불편함과

시간낭비

□ 민원 전화 폭주 장시간 통화로 방문 민원인 대기시간 길어짐

□ 추진실적

□ 전주시 홈페이지에 관련서식을 게재하여 민원인이 자유롭게

이용할 수 있도록 운영 및 홍보

- 게재내용 : 연혁,통계,위치,전화번호,자동차등록구비서류

및 관련서식23종

□ 이후계획

□ 홈페이지 게재내용 지속적 발굴

- 차량등록 업무 전반에 대한 모든 자료를 홈페이지에 게재

□ 자체 서버 개설로 홈페이지 확대 운영

자동차 정기검사 경과안내 개선

자동차 정기검사 경과안내를 1회 증회 안내함으로써 과태료 부담

및 행정명령에  따른 고발조치 등의 시민 불이익 최소화

□ 개    요

□ 자동차 등록대수:190,119대(2003.10월말 현재)

□ 사전안내 : 교통안전공단 전북지사(1개월 전) - 1회

□ 경과안내 : 차량등록사업소(경과 10일 이내)  - 1회

※ 법적근거 : 자동차관리법 시행규칙 제77조의2

□ 문 제 점

□ 자동차 정기검사 사전안내 법적근거 없음

□ 사전안내 교통안전공단  1회(만료일 30일전) 의존

□ 경과안내엽서 못 받을 경우 민원야기 상존

□ 추진실적

□ 1차 경과안내(경과 10일 이내) : 9,808건

□ 2차 경과안내(경과 30일 이내) : 4,611건

※ 주민 전산망 활용 실제 주소지로 발송

□ 유선통화 안내 병행실시(등록원부상 전화) : 1,162건

□ 추진효과

□ 전년대비 과태료 부과 건수 및 금액의 현저한 감소

구 분	2002년(1∼10월)	2003년(1∼10월)	비 고
부과건수	13,316	11,451	△ 14.0%
부과금액	1,476,810천원	1,278,610천원	△ 13.4%

□ 앞서가는 행정서비스 제공으로 행정 신뢰도 제고

사업용 자동차 정기점검 안내 시행

자동차관리법에 규정한 사업용 차량의 정기점검 안내 업무의

신설로 시민들의 경제적인 부담 해소 및 봉사행정 실현

□ 현     황  ------------------   9,451대(2003.10월말 현재)

□ 승용자동차 4,335    승합자동차  1,302     화물자동차  3,814

※ 관련법의 근거 미비로 안내절차는 없고 행정처분만 있음

□ 법적근거

□ 자동차관리법 제36조    (자동차의 점검 및 정비 )

□ 같은법 시행규칙 제59조 (정기점검 )

□ 문 제 점

□ 최초등록 후 장기간(승용3년, 승합4년, 화물5년)경과후 도래되는

정기점검으로 자동차 소유자 인지부족

□ 안내절차 없는 행정처분으로 행정처리에 대한 불만 팽배

□ 생계유지 수단인 소유자에게 막대한 경제적인 불이익 초래

※ 위반시 최고 30만원의 과태료 처분

□ 추진실적

□ 1차 경과안내(경과 10일 이내) : 365건

□ 2차 경과안내(경과 30일 이내) : 151건

※ 2차 경과안내시 주민전산망 활용 현 주소지로 발송

□ 추진효과

□ 안내제 실시로 전년대비 36.6% 과태료 부과 건수 감소

□ 양질의 행정서비스 제공으로 봉사행정 구현 및 행정 신뢰도 제고