제207회 전주시의회 임시회

사 회 문 화 위 원 회

2004년도

주 요 업 무 계 획

월드컵경기장운영기획단

목         차

□	일 반 현 황	-------------	3
	◦기구와 인력	-------------	4
	◦부서별주요기능	-------------	5
□	월드컵경기장 수익사업 추진	-------------	7～8
□	대규모 축구경기 유치계획	-------------	9
□	인라인스케이트 조성계획	-------------	11
□	월드컵경기장 시설물 안전관리 철저	-------------	12～13
□	잔디구장 관리철저	-------------	14
□	전국체육대회 마무리 추진	-------------	16～17

일반현황

ꏅ  기구와 인력

ꏅ  부서별 주요 기능

기 구 와 인 력

□ 기    구 -  3팀 6담당  33명

													월드컵경기장운영기획단
행		정 지			원		팀								시		설		관		리		팀								체		전		준		비		팀
			행정지원												관리								운영								체전지원				체전운영				체전시설
			(7)												(8)								(6)								(4)				(2)				(6)

□ 인    력 - 정원24명, 현원33명 (근무지정 6명 포함)

(   )근무지정

구 분		계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	기능	기타
계	현 원	33 (6)	1	3	6 (1)	12 (1)	4(1)		7 (3)
	정 원	24	1	2	3	10	4		4
행 정 지원팀	현 원	7 (1)	1	1	1	2	1		1 (1)
	정 원	11	1	1	1	6	1		1
시 설 관리팀	현 원	14 (1)		1	2	5	2		4 (1)
	정 원	13		1	2	4	3		3
체 전 준비팀	현 원	12 (4)		1	3 (1)	5 (1)	1 (1)		2(1)
	정 원

부서별 주요 기능

부 서 별	주 요 기 능	비 고
행정지원팀	○ 월드컵경기장 활용방안 추진 ○ 월드컵경기장 수익시설 사업추진 ○ 대규모 축구경기 유치
시설관리팀	○ 경기장 시설 유지관리 (토목, 건축, 전기, 음향, 조경전반) ○ 주․보조경기장 관리 ○ 월드컵경기장, 보조경기장 사용 허가 ○ 주변 관련시설 관리
체전준비팀	○ 전국체육대회 마무리 추진 ◦ 사업비 정산 ◦ 완산수영장 마무리

행정지원팀 소관

ꏚ 월드컵경기장 수익사업추진

ꏚ 대규모 축구경기 유치

월드컵경기장수익사업추진

○ 업 종 : 사우나, 판매및그린생활시설, 예식장, 골프장

○ 면 적 : 52,684평(실내4,729평, 실외 47,955평)

- 사우나 752평, 판매시설630평, 예식장 1,709평,

골프장 49,593평(실내 1,638평)

○ 대부료 : 3,979,406천원

- 사우나 121,125천원,  판매및근린생활시설 107,280천원

- 예식장 751,000천원,  골프장 3,000,001천원

ꏅ 지금까지 추진상황

○ 수익사업기본계획 확정 : 2003. 2. 21

○ 운영사업자 선정 계약 : 2003. 6. 27～2003. 7.18

○ 사업자별 수익시설에 필요한 설계 및 인허가 준비

- 교통영향평가, 환경성 검토, 기본설계, 설비설계 등

ꏅ 금후추진계획

전주시(행정)

▣ 울타리(1차검색선)철거 후 주차장조성

- 수익사업으로 없어질 외곽울타리(철망)를 철거 주차장 확보

○ 사업개요

- 철조망 철거 : 1,250m,  주차장 설치 : 800면

- 주차장확보면수 : 1,992면

∙ 기존주차장    : 1,192면,  신규 800면 확보

○ 설계 및 발주      : 2004. 2. 20 ～  3. 30

○ 공사 시행          : 2004. 4.  1 ～  5. 15

○ 부대시설 및 준 공  : 2004. 5.16 ～  5. 30

○ 소요예산 : 34,000천원

사 업 자

◎ 사우나시설

- 사우나시설 건축허가 : ‘03. 11. 7(덕진구청)

- 사우나사업공간 지반 보강공사 설계  : ‘03. 12월

- 사우나시설 공사착공 : ‘04. 1월

- 개 점 : ‘04. 5월 예정

◎ 예식장시설

- 교통영향평가서 및 인테리어설계 : ‘03. 8～’04. 2월

- 공사착공 : ‘04. 2월

- 개    점 : ‘04. 8월

◎ 판매및근린생활시설

- 매장구성 및 인테리어설계 : ‘03. 8～12월

- 공사착공 : ‘04. 2월

- 개    점 : ‘04. 8월

◎ 골프장시설

- 교통영향평가 및 환경성 검토 : ‘04. 2월

- 골프장기본설계 등 : ‘04. 2월

- 공사착공 : ‘04. 3월

- 개    점 : ‘05. 4월

대규모 축구경기 유치계획

◦ 전주월드컵경기장의 활용도 제고와 축구의 저변확대 계기 마련

◦ 대규모 축구대회의 적극적인 유치로 수익성 창출

ꏚ 현  황(‘04년도 국내 주요국제경기, 대한축구협회통계) -- 7게임 정도

○ ‘06 월드컵아시아 2차예선경기 : 3게임(홈&어웨이, 상세일정 미정)

○ 올림픽 아시아 최종예선경기    : 3게임(홈&어웨이)

- 홈경기 : 3/3 vs 중국,  4/14 vs 말레이시아,  5/12 vs 이란

- 어웨이 : 3/17vs이란,  3/24 vs 말레이시아,  4/28 vs 중국

○ 독일 대표팀 초청 친선경기     : 1게임(12/19 부산경기)

ꏚ ‘04년도 유치목표 ----- 4게임

○ ‘06 월드컵아시아 2차예선경기 : 1게임

○ 올림픽 아시아 최종예선경기    : 1게임

※ ‘04 아시아 챔피언스 리그      : 2게임

- 4/7 태국 BEC, 5/19 중국 상하이 (2004 AFC챔피언스 국제축구대회)

ꏚ 추진상황

○ 대한축구협회 방문 협의(전국유치) : 유치 요구 공문발송(‘04.1.16)

○ ‘04 아시아 챔피언스 리그         : 2게임 확정

※ 기타 금석배 대회(5월중)와 미확정된 전국규모대회 유치 추진계획

시 설 팀  소 관

ꏚ 인라인스케이트장 조성계획

ꏚ 월드컵경기장 시설물 안전관리 철저

ꏚ 잔디구장 관리 철저

인라인스케이트장 조성계획

○ 월드컵경기장을 시민위주의 편의 휴식공간 제공 및 종합레포츠 타운 조성

○ 경기장 주변의 공간면적을 최대한 활용하여 효율적인 경기장 운영에 만전

ꏚ 사업개요

○ 조성시기 : 2004. 3월 ～ 5월중

○ 활용면적 : 300평정도(만남의 광장  분수대 주변)

○ 조성방법 : 폭 5m × 200m 우레탄 트랙

○ 사 업 비 : 100,000천원

ꏚ 추진계획

○ 인라인 트랙설치(안) 의견 수렴 - 인라인협회(인가 수속 중)

○ 설계 및 발주          : 2.  1 ～ 2. 29

○ 포장 및 우레탄시공    : 3. 15 ～ 4. 20

○ 부대시설 설치 및 준공 : 4. 21 ～ 4. 30(어린이날 개장)

ꏚ 기대효과

○ 시민의 바램에 부응하는 시정 추진

○ 가족단위 체력단련 및 여가 선용장소로 제공

○ 인라인 동호인의 폭발적 증가에 따른 인라인스케이트 메카 조성

○ 기 설치하여 활용하고 있는 X-게임장, 농구장의 활용도 제고

월드컵경기장 시설물 안전관리 철저

○ 효율적인 경기장의 유지관리를 통한 시설물을 최상의 상태로 유지

○ 국제경기, 프로축구 경기 시 차질 없는 시설관리 운영

ꏅ 사업개요

○ 추진기간 : 년중

○ 주요내용

- 정기적인 시설점검

- 계절별, 분야별 효율적인 유지관리 방안 마련

- 지붕구조 계측시스템 효율적 관리

ꏚ 추진계획

○ 정기(법적)점검 실시

- 점검기간 : 2004. 1월 ～ 12월

- 점검사항 : 승강기․ 보일러정기점검, 도시가스, 가스터빈발전기,

소방시설 정기점검, 상․하반기 안전점검

- 점검방법 : 외부전문기관 용역

○ 자체인력 및 기술에 의한 개․보수 및 수시 점검실시

- 추진기간 : 2004. 1월 ～ 12월

- 추진방법 : 자체인력 활용(토목1, 건축1, 기계3, 전기4, 통신1, 임업1)

○ 정기하자검사 실시

- 추진기간 : 2004. 상․하반기

- 참여인원 : 7개 분야   11명

○ 지붕구조물 유지관리 계측시스템 관리

- 추진기간 : 년중

- 추진방법 : 전문가의 기록자료 분석 및 시스템 유지관리 용역

○ 시설물유지관리 기록 및 점검 철저

- 추진기간 : 주간/월/분기/반기/년

- 추진방법 : 유지관리 점검 및 기록대장 작성 관리

정밀점검 시행(준공 3차년도)

담당자 시설물유지관리 전문교육과정 교육실시

ꏚ 향후 추진계획

○ 2004년 14,950천원을 투자 계측시스템 유지관리용역 시행

○ 시설물관리에관한특별법 규정에 따라 2004년도 10월중에

50,000천원을 투자 정밀점검 시행

잔디구장 관리 철저

○ 보식잔디를 조기활착시켜 소년체육대회등 각종 대규모 행사에 대비

○ 집중적인 잔디관리로 최상의 잔디환경을 유지 양질의 잔디구장 구비 만전

ꏚ 개    요

○ 면  적

- 주 경기장 : 7,739㎡(109m×71m)

- 보조경기장 : 7,668㎡(108m×71m)

- 예 비 포지 : 960㎡

- 잔디스텐드 : 14,364㎡

○ 초  종 : 캔터키블루그래스 85% ＋ 페레니얼라이그래스 15%

ꏚ 추진계획

○ 잔디관리 전문업체 위탁관리 시행

- 잔디관리 기간 : 2004. 2. ～ 2004. 12.

- 잔디관리 내역

∙ 잔디깎기 59회, 관수 92회, 시비 24회, 병충해방제 29회, 제초작업  6회,             에어레이션 2회, 버티칼모잉 1회, 배토 12회, 라인마킹 31회, 롤링 6회,               경기전후관리 27회, 잔디스텐드관리등

○ 잔디보식에 따른 잔디휴면기 도입 : ‘03년 10월 ～ ’04년 5월

ꏚ 문제점 및 대책

○ ‘04년 5월 전 잔디사용시 잔디뿌리 발근 부족으로 잔디훼손 발생 우려

- 잔디휴면기 내 사용 억제

ꏚ 소요예산

○ 월드컵경기장 잔디관리 용역 : 200백만원

체전준비팀 소관

ꏚ전국체육대회 마무리 추진

○ 사업비 정산

○ 완산수영장 마무리

제84회 전국체육대회 마무리 추진

1. 사업비 정산(2003. 12. 31현재)

ꏚ 집 행 내 력

(단위 : 천원)

분 야 별	예 산 액	집 행 액	잔 액	비 고
계	32,436,330	31,684,385	751,945
경기장신축 (수영․롤러장)	24,500,000	24,059,222	440,778
경기장 개․보수 (15개 경기장)	4,743,330	4,521,234	222,096
도시환경정비 (10개 분야)	2,935,000	2,872,041	62,959
도 재배정사업 (4개 분야)	258,000	231,888	26,112

ꏚ 그 동안 추진상황

○ 롤러스케이트장 및 경기장 개․보수 사업비 등 정산

- 롤러스케이트장

․ 예산액 : 2,000,000천원,  ․ 집행액 : 1,935,980천원, ․ 잔액 : 64,020천원

○ 도시환경정비 및 도비 재배정사업 정산완료

ꏚ 앞으로 추진계획

○ 완산수영장 준공 후 정산 마무리

- 준공일이 2004. 1. 19인 관계로 1월말까지 완료예정

․ 예산액 : 22,500,000천원,  ․집행액 : 22,063,000천원, ․잔액 : 437,000천원

※ 집행 잔액은 국50%․도32%․시18%비율에 따라 반납

2. 완산수영장 마무리 대책

ꏚ 공사 추진 상황

구 분	사 업 규 모	진 도	비 고
건축,토목,조경	경영풀 10레인, 다이빙1면, 관람석2,000, 주차 210면	100%	준공검사 처리중
기계 설비	수처리 및 보일라 시설 등	100%	2003. 12. 31 완공
전기 설비	전광판 및 계측장비 등	100%	2003. 12. 31 완공

ꏚ 사업비 집행 상황

(백만원)

예 산 액	집 행 액	잔 액	비 고 (예산액)
22,500	22,063	437	국비 : 11,200 도비 : 7,275 시비 : 4,025

ꏚ 수영장 개장 추진

- 2004. 1월말까지 수영장 시설을 완벽하게 마무리하고

- 2004. 2월초부터 조례개정, 내부수탁자선정, 관리 및 운영

인력배치 등 제반 절차를 거쳐

- 빠른 시일내에 시민의 휴식공간으로 활용할 수 있도록 하겠음.