제219회 전주시의회 제2차 정례회

2004년도 행정사무감사 / 도시건설위원회

2004년도

주요업무 추진상황 보고

도 시 관 리 국

보  고  순  서

□	일 반 현 황		-----------	2
□	2004년도 시 책 방 향		-----------	10
□	2004년도 주요업무추진		-----------	11
	○	도 시 과	-----------	12
	○	주 택 행 정 과	-----------	18
	○	도 로 과	-----------	26
	○	교 통 과	-----------	48
	○	하 수 과	-----------	54
	○	도 시 발 전 기 획 단	-----------	65
	○	환 경 사 업 소	-----------	70
	○	차 량 등 록 사 업 소	-----------	74

일  반  현  황

ꏅ 기구 ꠚꠚ  5과  1단  2사업소  34팀(현원 188명)

															도 시 관 리 국
	도 시 과														주 택 행 정 과																도 로 과
기업회계			도시계획				택 지 개발			토지관리				상가활성화			도심재정비			농촌지역개발			공동주택			일반건축				가로환경개선			도로재산관리			철도도로시설			도로유지관리			도로교통시설

	교 통 과																하 수 과													도시발전기획단
주차장관리			운송사업지도			대중교통			교통정보관리			경전철				하수도공기업			하수시설				재난방재			하천관리			용지보상			사단이전				공단조성			신시가지조성

	환경사업소														차량등록사업소
관리			하수처리				위생처리			실험				총괄지원			등록			건설기계등록

ꏅ 인 력                                                 (2004. 11월현재)

과 별		총 계	일 반 직						별정	기능	청경
			4급	5급	6급	7급	8급	9급
계	정 원	187	1	8	34	45	36	7	1	52	3
	현 원	188		9	34	62	25	2	1	52	3
도 시 과	정 원	21	1	1	4	5	6		1	3
	현 원	22		2	4	8	4		1	3
주택행정과	정 원	19		1	5	8	4			1
	현 원	19		1	5	9	3			1
도 로 과	정 원	21		1	5	8	5			2
	현 원	21		1	5	10	3			2
교 통 과	정 원	29		1	5	8	4	2		9
	현 원	29		1	5	10	2	2		9
하 수 과	정 원	18		1	4	6	3	1		3
	현 원	18		1	4	8	2			3
도시발전 기 획 단	정 원	16		1	4	6	3			2
	현 원	16		1	4	7	2			2
환경사업소	정 원	40		1	4	3	3	4		22	3
	현 원	40		1	4	7	3			22	3
차량등록 사 업 소	정 원	23		1	3	1	8			10
	현 원	23		1	3	3	6			10

ꏅ 분장사무

과 별	분 장 사 무
도 시 과	○ 도시계획결정․지적고시, 도시계획사업 시행인가 ○ 택지개발사업․구획정리사업 및 가로등관리 ○ 전문건설업 및 건설기계사업자, 건설기계조종사 관리 ○ 개별공시지가, 지적측량검사, 새주소부여사업관리
주택행정과	○ 국민주택관리․상환금 운영, 학교용지부담금 부과 ○ 주택건설사업계획승인, 사용검사, 주택정책 수립 ○ 건축인․허가, 건축심의, 건축조례 제․개정운영 ○ 주거환경개선, 구도심활성화사업, 농촌지역개발사업
도 로 과	○ 도로부지관리, 도로안내표지판 설치관리 ○ 도로포장 보수지도, 자전거도로 시설 ○ 신규도로개설 및 용지보상 ○ 가로환경 및 노점상 지도단속, 자전거이용 활성화 ○ 도로교통 안전시설물 신설 및 유지관리
교 통 과	○ 교통종합계획 수립, 공영주차장 확충 및 관리 ○ 자동차운송사업체(버스. 택시 등) 지도감독 ○ 교통정보센타 운영 및 교통체계 개선사업 ○ 대중교통(버스, 택시, 화물) 업무 추진 ○ 경전철 사업 추진
하 수 과	○ 하수도공기업 운영, 건교부소관 국․공유재산 관리 ○ 하수처리장 건설, 하수 관거사업 추진 ○ 재난재해대책, 자연하천조성사업, 하천관리
도시발전기획단	○ 서부 신시가지 조성사업 ○ 35사단 이전사업 ○ 연초제조창부지활용, 전주교도소이전, 첨단산업단지조성
환경사업소	○ 하수․분뇨 처리시설 운영 ○ 각종 수질분석 측정관리 및 공장폐수 분석 ○ 차집관거 유지관리
차량등록사업소	○ 자동차 등록(전산입력, 자료관리 및 증명발급 등) ○ 자동차 및 건설기계 과태료부과 ○ 건설기계등록(전산입력,증명발급,검사최고,정비명령 등)

ꏅ 기본현황

○ 도시계획 연혁

년 월 일	고 시 청	번 호	계획면적 (㎢)	목표 년도	계획인구	주 요 내 용
’38. 5. 9.	조선총독부	403	19.76	1948	100,000	도시계획구역 결정(1차)
’66. 2. 10.	건설교통부	2,188	108.71	1983	550,000	도시계획 재정비(2차)
’70. 4. 14.	″	178	157.22	1986	500,000	도시계획 재정비(3차)
’73. 6. 27.	″	258	313.20			개발제한구역 216.4㎢ 지정
’74. 8. 14.	″	272	313.20			도시계획 재정비(4차)
’76. 3. 27.	″	37	313.20			도시계획 재정비(5차)
’86. 5. 8.	″	206	313.20	1991	610,000	도시계획 재정비(6차)
’95. 6. 29.	전라북도	112	313.20	2001	860,000	도시계획 재정비(7차)
’03. 6. 26.	건설교통부	161	302.67			개발제한구역 225.4㎢해제

○ 용도지역  --------------------  4개지역 302.67㎢

구분	주 거 지 역			상업 지역	공 업 지 역				녹 지 지 역
	계	일 반 주 거	준주거		계	전용공업	일반 공업	준공업	계	생산 녹지	자연 녹지	보전 녹지
면적	31.520	31.613	0.357	4.201	6.290	1.444	4.178	0.668	260.655	40.327	111.155	109.173
비율 (%)	10.41	10.29	0.12	1.39	2.08	0.48	1.38	0.22	86.12	13.32	36.73	36.07

○ 용도지구  ----------------  8개지구 16,138,933㎡ (4,882천평)

지 구 명	개 소 수	면 적(㎡)	비 고
고 도	16	7,955,679
방 화	20	4,165,097
미 관	57	2,039,727
자연취락	58	1,225,851
경 관	7	406,500
시설보호	1	249,900
아 파 트	1	90,000
보 존	2	6,179

○ 주  택

구 분	계	단독주택	다세대 주택 동당660㎡미만	연립주택 (4층이하)	아파트 (5층이상)	주택보급율 (2003년도)
주택수	180,515	58,096	4,535	3,414	114,470	88.95%
비율(%)	100	32.18	2.52	1.89	63.41

○ 지  적

(단위 : ㎢)

구분	합 계		대 지			임 야			기 타
	필지수	면적	필지수	면적	%	필지수	면적	%	필지수	면적	%
계	192,921	206.3	73,532	24.0	11.6	11,069	72.3	35.1	108,320	110.0	53.3

○ 도  로

(단위 : 개소.㎞)

구 분	계		고속국도		일반국도		지 방 도		시 도
	노선	연 장	노선	연 장	노선	연 장	노선	연 장	노선	연 장
총연장	129	391	1	5	5	65	3	22	120	299
포장도	129	391	1	5	5	65	3	22	120	299
포장율 (%)		100		100		100		100		100

※ 도로율 : 16.28%(도로면적/시가지면적)

○ 교량 및 기타시설물

(단위 : 개)

구분 계	교 량					육교 보도	지하 보도	지하차도	터널	비 고
	소계	고속 국도	시의 국도	지방도	시도
124	105		34	3	68	6	6	5	2

※ 장대교량(삼례교 : 570m,  회포대교 : 707m)

○ 건설기계조종사면허 현황

(단위 : 건)

계	불도우저	굴삭기	로우더	지게차	기중기	로울러	기 타
5,907	359	1,984	501	1,432	291	111	1,229

○ 옥외광고물 현황

(단위 : 개)

광고업자 등록현황	시 지 정 광 고 시 설				비 고
	계	게시대	벽보판	기 타
466	511	150	361	-

○ 운수업체

(단위 : 개소/대)

구 분	계	버 스			택 시		화 물		렌트카	특수차	특수여객
		시내	시외	관광	회 사	개 인	회 사	개 인
업 체 수	218	5	5	19	25	2	79		21	49	13
보유대수	9,808	407	443	321	1,599	2,162	1,766	2,050	811	224	25

○ 자동차등록

(단위 : 대)

합 계	승 용 차	승 합 차	화 물 차	특 수 차
194,703	142,339	14,026	38,039	299

○ 하  천

(단위 : ㎞)

구 분		개소	하천연장	제 방 연 장			개수율 (%)	비고
				계	기개수	미개수
계		33	118.3	202.2	182.4	19.8	90.2
법정하천	소 계	30	111.9	189.4	176.0	13.4	93.0
	국가하천	3	14.8	25.6	25.6	-	100.0
	지방 1급	2	21.2	37.5	36.0	1.5	96.0
	지방 2급	25	75.9	126.3	114.4	11.9	90.6
소 하 천		3	6.4	12.8	6.4	6.4	50.0

○ 하 수 도

구 분		처리구역 (㎢)	계획연장 (㎞)	시설연장 (㎞)	미시설연장 (㎞)	보급율 (%)	비고
계		53.1	2,317	1,313	1,004	56.7
합 류 식		18.9	653	653	0	100.0
분류식	소 계	34.2	1,664	660	1,004	39.7
	오수관거	-	920	428	605	46.5
	우수관거	-	744	232	399	31.2

○ 하수․위생처리 시설

구 분	하 수 처 리	위 생 처 리
위 치	덕진구 송천동 2가 1035번지
시설용량	1일 처리능력 ⇨ 303,000㎥ - 1단계 시설 : 103,000㎥ - 2단계 시설 : 200,000㎥	1일 처리능력 ⇨ 290㎘ - 분 뇨 : 30㎘ - 정 화 조 : 260㎘
처리방법	표준 활성 슬러지법	하수 연계처리 (1994년부터 시행)

○ 차집관로

하 천 명	연 장 (㎞)	맨 홀 (개)	우수토실 (개소)	환기구 (개소)	여수토실 (개소)
계 (5개노선)	44.7	507	174	53	3
전주천 (좌, 우안)	14.3	155	112	36	2
삼 천 (좌, 우안)	10.2	82	37	16
금암천 (좌, 우안)	1.5	31	20	1
아 중 선	10.9	151	5
팔복선(공장,생활)	7.8	88			1

2004년도 시책방향

	도시공간구조 재편 광역도시 기반구축
◦ 100만 인구를 수용할 수 있는 도시기반시설 확충 ◦ 자연과 더불어 쾌적한 환경속에서 경쟁력있는 도시건설 ◦ 재난 재해의 피해발생 사전예방

⇩

	중점추진방향
			ㅡ
		ㅣ
◦ 광역도시 기반시설을 위한 도시계획 재정비 마무리 ◦ 미래지향적인 교통체계구축과 질높은 대중교통서비스제공 ◦ 삶의 질 향상을 위한 구 도심권 활성화 및 주거환경개선사업 추진 ◦ 도시하천의 수질개선 자연환경 보존 및 재난방재 ◦ 택지개발로 안정적인 주택공급 및 도시기반시설 구축

2004년도

주요업무추진상황

도 시 과  소 관

ꊱ	전주도시관리계획 재정비 추진 ------------	13
ꊲ	도시계획 시설부지 매수청구제 시행 -------	14
ꊳ	송천지구 토지구획정리사업 ---------------	15
ꊴ	아중지구 체련공원 조성사업 --------------	16
ꊵ	토지관리 정보시스템 인터넷 확대운영 -----	17

전주도시관리계획 재정비 추진

ꏅ 개    요

○ 과업범위 : 전주시 도시계획구역 일원(313.18㎢)

○ 과업기간 : 2001.05 ～ 2005.02월

○ 목표연도 : 2011년           ○ 계획인구 : 760천명

○ 주요내용

- 도시계획구역 조정, 용도지역․지구 변경

- 일반주거지역 종세분화 □ 제1종, 제2종, 제3종

- 도시기반시설의 정비 및 단계별 집행계획 수립 등

ꏚ 추진실적

○ 도시계획재정비(안) 주민의견청취 공람 ---- 2004.08.08～21

○ 전주시의회 의견청취(4차 본회의) --------- 2004.09.04

○ 전주시 도시계획위원회 자문 -------------- 2004.10.05

○ 전주도시관리계획 결정신청(전라북도) ----- 2004.10.18

○ 도시계획재정비 계획(안) 설명(도 건설행정과) - 2004.10.25

○ 계획(안) 전라북도 사전 서류검토 및 현장 확인 진행중

ꏚ 이후계획

○ 전라북도 검토 완료 후 지방도시계획위원회 상정

○ 전주시 도시계획재정비 완료 --------------- 2005.02월중

도시계획시설부지 매수청구제 시행

ꏅ 매수청구대상 및 절차

○ 대상 : 2001.12.31기준 도시계획시설 결정후 10년이상된 시설중

지목이 “대지”인 토지는 2002.1월부터 매수청구 가능

- 필지수: 931필지, 면적: 493천㎡, 보상비: 3,823억원정도

○ 절차 : 청구일부터 2년이내 매수여부 결정, 결정 후 2년이내 매수

ꏅ 매수청구 현황

○ 매수청구기간(2002.01월 ～ 2004.10월말 현재)

- 신 청 건 수 : 125건  (도로 110, 공원 12, 기타  3)

- 청 구 면 적 :  25천㎡(도로  16, 공원  7, 기타  2)

- 매수 추정액 : 203억원(도로 145, 공원  9, 기타 49)

○ 연도별 신청건수 : 2002년 85건, 2003년 28건, 2004년 12건

ꏅ 추진실적

○ 매수결정 통보 85건 119억원 ------ 2004.01～10월까지

- 2002년도 접수분(매수 69건 108억원, 불가 16건 11억원)

․ 도시계획시설내 건축허용대상 : 매수 불가 통보한 토지 및

매수 통보한 날로부터 2년이내에 매수하지 못한 토지

- 건축허용범위 : 철근콘크리트 및 철골철근콘크리트가 아닌

건축물로 단독주택(3층이하), 제1종근린생활(3층이하), 공작물

ꏅ 이후계획

○ 연중 토지소유자로부터 매수청구 접수후 현지 여건 분석

○ 도시계획시설부지 매수청구시 관련부서 협의 및 전문가 의견수렴

○ 시설별 소관부서 매수여부 참조하여 분기별 최종 결정 통보

송천지구 토지구획정리사업

ꏅ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 송천동 1‧2가 일원(농수산물 도매시장 남단)

○ 사업규모 : 택지조성 262,480㎡(79,400평)

○ 사업기간 : 2001.07 ～ 2005.03

○ 총사업비 : 19,890백만원(공사비 11,000  보상비및기타 8,890)

ꏅ 추진실적(공정 68%)

○ 사업시행인가  ----------------------------- 2001.07.23

○ 공사 착공  -------------------------------- 2001.11.15

○ 문화재 발굴조사(31,400㎡)및 심의보존면적 결정 -- 2002.12.27

- 발굴유적 : 청동기시대 주거지 1기, 원삼국시대 주거지 66기 등

- 문화재 보존지역 결정 : 도로망 존치(약2,100평)

○ 도시계획변경 및 지구단위계획 결정을 위한 주민의견청취 - 2003.04

○ 도시계획변경 및 지구단위계획 결정을 위한 도시계획위원회

자문 및 시의회 의견청취 -------------------- 2003.07.

○ 도시계획변경 및 지구단위계획구역 결정고시(전북도) - 2004.03.26

○ 환지예정지 공고에 따른 토지주 공람절차 이행 --- 2004.05.14

○ 환지예정지 지정 및 예정지 공고 -------------- 2004.08.07

ꏅ 이후 계획

○ 체비지 매각(26필지) ---------------------- 2004.12

○ 환지확정 측량시행 ------------------------ 2004.11~2005.01

○ 환지확정 처분(소유권 등기, 면적확정 등) ----- 2004.12~2005.03

○ 공사준공(택지개발 및 도로확장 등) -------- 2005.04.30

아중지구 체련공원 조성사업

○ 아중지구 개발 완료에 따른 유입인구 증가로 지역 주민들의

정서생활 향상에 기여할 공간의 조성 필요

○ 도시공원법의 도시자연공원 지정목적에 적합하고 이용 가능한

가족단위 휴식(체련)공간 조성 시급

ꏅ 공사개요

○ 위    치 : 덕진구 인후1가, 우아1가 일원(아남아파트 남측)

○ 사업규모 : 부지 49,037㎡(14,834평)

○ 총사업비 : 110억원(1단계 95,  2단계 15)

○ 사업기간 : 1단계(2002~2005), 2단계(2005~2006)

○ 내    용 : 다목적구장, 국민체육센터(수영장), 혼합경기장

조경휴게지, 배드민트장, 게이트볼장, 배구장 등

※ 국민체육센터 : 건축면적368평(연면적623평 지하1층 지상2층)

- 주요시설 : 수영장 211평(25m×6레인), 헬스장 63평

ꏅ 추진실적(공정 35%)

○ 아중지구 체련공원 조성사업 계획수립  -------- 2001.11

○ 공원조성기본계획(변경) 및 실시설계용역 완료 - 2002.11

○ 토지 및 지장물 보상 착수  ------------------- 2002.12～

○ 공사착공  ----------------------------------- 2003.11

○ 공원조성계획 변경(국민체육센터 반영) -------- 2003.12

○ 토지수용절차 이행 완료 ---------------------- 2004.08

○ 국민체육센타 착공(공정 8%) ----------------- 2004.10

ꏅ 이후계획

○ 아중체련공원 조경공 완료 -------------------- 2005.06

○ 체련공원(1단계) 및 국민체육센터 준공 -------- 2005.11

토지관리정보시스템 인터넷 확대 운영

토지와 관련된 모든 데이터를 전산화하는 토지관리정보체계가

완료됨에 따라 이를 인터넷에 공개하여 우리시 토지에 관련된

자료를 전국 어디서나 열람할 수 있도록 함.

ꏚ 사업개요

○ 인터넷 공개 전산자료

- 지적․임야대장 자료

- 지적․임야도면 자료

- 공시지가 자료

- 수치지형도 자료

- 토지이용계획 확인원 속성 및 도면 자료

ꏚ 추진실적

○ 토지관리정보시스템 사업 ------------- 2001.09완료

- 건교부 주관으로 12개 시․군 사업추진

○ 구청․동 에서는 민원발급 기타 모든 부서는 업무용으로 사용

ꏚ 추진계획

○ 인터넷 기반 토지정보조회시스템 개발 -- 2004.11～2005.02

○ 토지정보조회시스템 시범운영 --------- 2005.03～2005.04

○ 토지정보조회시스템 운영  ------------ 2005.05

주 택 행 정 과  소 관

ꊱ	노후화된 서민 공동주택 환경개선사업 -----	19
ꊲ	도시주거환경개선 사업 -------------------	20
ꊳ	2단계 도시주거환경개선 사업 -------------	22
ꊴ	구도심 활성화사업 -----------------------	23
ꊵ	농촌지역 주거환경개선사업 ---------------	24
ꊶ	국민주택융자금 회수 및 상환 -------------	25

노후공동주택 관리비용 지원

ꏚ 실태 및 현황

○ 노후 공동주택에 대한 지원의 필요성이 지속 제기되어 법개정

- 노후공동주택의 경우 자부담으로 시설의 보수 등이 어려움

- 주택법개정 : 조례로 공동주택 관리비용의 일부를 지원가능

○ 2004년 본 예산 : 100백만원(연차지원 예정)

ꏚ 추진실적

○ 노후공동주택 실태조사 / 20년이상, 33개단지 - 2003상반기

○ 주택법 개정 -------------------------------- 2003.11.30

○ 주택법개정에 따른 지원조례(안) 마련 -------- 2004상반기

○ 입법예고,조례규칙심의,규제심사-가결 -------- 2004.07～10

- 지원대상 : 15년이상 아파트 전용60㎡이하 50%이상 단지

- 지원금액 : 사업비의 70%이하로써 1,000만원 이하

ꏚ 이후계획

○ 아파트연합회 추가의견청취, 타지자체 지원사례 추가조사

- 조례관련 아파트연합회 간담회(주택행정과) -- 2004.10

- 송파구, 과천 등 7개 지자체가 추진중으로서 지원사항을

구체적으로 조사하여 조례에 반영

○ 조례 제정(안) 작성 후 의회 도시건설위 간담회실시 등 의견수렴 후

조례“안” 결정

○ 조례 제정 후 관리비용 지원 신청에 따라 지원시행 예정

도시주거환경 개선사업

도시저소득 주민을 위한 주거환경개선의 지속추진으로 삶의 질을

향상시키고 모든 시민이 함께 잘사는 으뜸 복지도시건설

ꏅ 사업개요

○ 위    치 : 진북동 도토리골지구 등 18개지구

○ 사업규모 : 863,571㎡(261,231평), 16,881명(5,1546가구)/3,822동

○ 총사업비 : 88,645백만원(국비36,596, 도비8,123, 시비43,926)

○ 사업기간 : 2001 ~ 2005년(당초 2004년)

ꏅ 추진실적

○ 17개지구 지정고시  ------------------------ 1999.11.24

○ 낙수정지구 지정고시  ---------------------- 2002.12.26

○ 완   공 : 15개지구(도토리골, 어은2․3, 밤나무골, 앞검암 등)

※ 공정율 90%이상(병사부,오목대2,공수내,용머리2,효정,난민촌2)

○ 미 완 공 : 3개지구(낙수정, 인후농원, 난민촌)

○ 현 전체 공정의 93% 완료

- 도  로 : 82개노선   - 주차장 : 21개소   - 소 공 원 : 8개소

- 놀이터 : 15개소     - 경로당 : 8개소    - 이주유도 : 3개소

ꏅ 이후계획

○ 낙수정과 난민촌 기반시설 및 주민복리시설 : 2005.12월 완료예정

○ 인후농원(주택공사시행)

- 감정평가 보상실시, 주택철거 및 사업착수 : 2006.12.완료예정

※ 병사부,오목대2,공수내,용머리2,효정,난민촌2 잔여공사 마무리

ꏚ 도시주거환경개선사업 지구별 현황           (단위 : 백만원)

지구명	사 업 계 획	사업비	진도(%)
계	18개 지구	88,645	93
도토리골 (진북2동)	도로개설 2, 주차장 1, 경로당 1, 놀이터 1, 소공원 1	3,389	100
어 은2 (진북2동)	도로개설 2, 주차장 3, 경로당 1, 놀이터 1, 소공원 1 휴게시설 1	2,787	100
어 은3 (진북2동)	도로개설 6, 주차장 3, 놀이터 2	5,666	100
보 문2 (인후1동)	도로개설 2	950	100
밤나무골 (금암1동)	도로개설 5, 주차장 3, 놀이터 1, 휴게시설(경로당) 1	4,991	100
앞검암 (금암2동)	도로개설 4, 주차장 2, 놀이터 1, 소공원 1	3,269	100
난민촌2 (서노,중노2)	도로개설 6, 주차장 2, 놀이터 1, 소공원 2, 경로당 1 이주유도 1	7,234	95
병사부 (남노송)	도로개설 5, 경로당 1	2,853	95
마당재2 (중노1동)	도로개설 6, 주차장 1, 놀이터 1, 경로당 1	3,297	100
오목대 (교동)	소로개설 4, 주차장 3, 이주유도 1, 경로당 1	4,972	95
공수내 (동․서서학동)	소로개설 14, 주차장 2, 경로당(휴게실) 1, 녹지 1	10,969	95
수 도 (동완산)	소로개설 3, 놀이터 1, 경로당 1, 주차장 2, 이주유도 1, 법면정비 1	2,996	100
용머리2 (서완산)	소로개설 8, 주차장 3, 놀이터 2, 이주유도 1	7,686	100
용머리3 (서완산)	소로개설 5, 주차장 2, 놀이터 1, 경로당 1	5,459	100
효 정 (효자1,서완산)	소로개설 11, 주차장 4, 놀이터 1, 경로당 2, 소공원 1	10,562	95
화 산2 (중화산1)	소로개설 6, 주차장 1, 놀이터 2, 휴게시설 1	4,448	100
인후농원 (인후1)	공동주택 423세대(사업계획승인 : 2002.02.01)	3,000	5
낙수정 (교동)	소로개설 10, 주차장 1, 놀이터 1, 경로당 1, 이주유도 3, 상수도가압시설, 급․배수관교체	3,922	30

2단계 도시주거환경개선 사업

ꏚ 사업개요

○ 지구수 : 대동지구 등 현지개량 21개소(완산12, 덕진9)

- 사업면적 : 1,557,318㎡(471,914평)

- 건물동수 : 5,246호

- 인 구 수 : 23,780인(6,126세대)

○ 사업기간 : 2006 ~ 2010년(5개년 연차사업)

○ 사 업 비 : 1,016억원

- 국 비 : 508억,  지방비(교부금 포함) : 508억

○ 사업내용

- 도시기반시설, 공원조성14개소, 공용주차장49개소, 놀이터6개소 등

- 주택개량자금 지원(연리 3%, 1년거치 19년 균등분할상환)

- 담장없애기 등 동네공원화 사업추진(실시설계 반영 추진)

ꏚ 추진실적

○ 실태 및 사업예정지구 조사 ------------ 2003.06.01~06.30

○ 건교부 및 교수 주공 현지실사 --------- 2003.08.21

○ 건교부 2단계 사업지구 선정 발표 ------ 2004.03.16

- 주거환경이 불량한 정도에 따라 선정(전국430, 전북61, 전주21)

○ 2단계 사업비 연차별 추진계획 확정 통보 -- 2004.08.19

ꏚ 이후계획

○ 정비구역지정 및 개선계획 수립, 투융자심사 추진(2005년)

- 도시주거환경정비 기본계획 용역과 병행 시행

○ 정비사업 추진 ------------------------- 2006~2010

구도심 활성화사업

ꏅ 사업개요

○ 대    상 : 구도심권 14개동 12㎢

○ 개    요

- 특화거리 조성 6개소, 주차장 확충 4개소, 오픈스페이스정비 등

○ 사업기간 : 2002.08 ～ 2011.12(10개년)

○ 사 업 비 : 41,252백만원

- 2003이전 예산액 : 5,846백만원

(주차장 4,000  차이나 1,346  영화거리 500 등)

- 2004년 예산확보 : 1,200백만원

(차이나거리조성 450, 도정법용역 350, 보조금 300, 이벤트 100)

ꏅ 추진실적

○ 구도심활성화사업 지원 조례 공포 --------------- 2003.12

○ 도시․주거환경정비 기본계획수립 용역 시행 ----- 2004.10

○ 차이나거리 조성공사 시행완료 ------------------ 2004.11

ꏅ 이후계획

○ 구도심 활성화 보조금 지급(우선4대문안) ------ 장기적추진

- 2004년 지급 : 100백만원

- 2005년 확보 : 400백만원

○ 도시․주거환경정비 기본계획수립 용역 추진 ----- 2006.06

○ 웨딩거리 조성 실시설계 및 사업시행 ------------ 2005.03

- 총사업비 : 2,300백만원(예산확보 200백만원 : 실시설계50, 사업150)

ꏅ 문제점 및 대책

○ 구도심활성화 및 공동화방지를 위하여 지속 확대 추진.

- 특화거리기반시설조성 및 이벤트 행사로 구도심 활성화 다각적 검토

- 건축시 건폐율 용적율 주차장 설치비용 납부 감면 및 보조금

지원 수혜 확대

농촌지역 주거환경개선사업

도․농간 지역균형 발전을 위하여 열악한 농촌주거환경 기반시설을

확충함으로서 농촌주민들의 질적 수준 향상을 도모하고자 함

ꏅ 사업개요

○ 전주시 농촌마을 개발계획 용역 : 97백만원

- 농촌 생활환경 개선을 위한 기반시설정비 계획수립

○ 농촌 주거환경개선(마을정비)사업

- 사업비 : 1,620백만원(국비821 도비560 시비239)

- 하수처리시설, 도로포장 등 기반시설

○ 농촌마을 환경개선사업 : 2,000백만원

- 마을기반시설(도로포장, 하수도 등)사업 - 38개 지구

ꏅ 추진실적

○ 전주시 농촌마을 개발계획 용역

- 용역기간 : 2004.10.14~12.28

- 대상지역 : 210개마을 430㏊ 전지역

○ 농촌주거환경개선(마을정비)사업

- 실시설계 용역완료 및 사업발주 : 한절리, 삼천

○ 농촌마을 환경개선사업

- 38개 지구 : 2004.12월말 사업완료

ꏅ 이후계획

○ 전주시 농촌마을 개발계획 용역

- 현지조사 및 다양한 전문가 의견 수렴 후 개발계획 수립 - 2004.12.28

○ 농촌주거환경개선(마을정비)사업

- 공사시행 완료 ------------------------------ 2005.05.30

국민주택융자금 회수 및 상환

국민주택 융자금 자진 상환 유도와  고질․고액 연체자에 대하여

강력한 징수를 통하여 체납사고 사전 불식 및 체납액 회수

ꏅ 융자금 현황

○ 차  입  액 : 3,467세대  21,160,700천원

○ 조      건 : 1년거치 19년 체증식상환

○ 상환  기간 : 1977 ～ 2008년

○ 상환  금리 : 약정이자 연 5%(연체이자 연10%)

ꏅ 추진실적

○ 상 환 액 : 18,237,443천원(86.1%)

○ 상환잔액 :  2,923,257천원

ꏅ 이후계획

○ 2004년 상환예정액 : 1,871,704천원

- 상환액 : 798,581천원(원금683,633  이자114,948)

○ 고액체납자 방문독려

○ 연체자 납부독촉장 발부

○ 실소유자 인적사항조사(임의 소유권이전 및 매매자)후 징수독려

○ 고액연체자 경매 진행 --------------- 65건 529,617천원

- 경매 후 배당금 수령 ---------------  5건   28,382천원

- 경매진행중 ------------------------ 21건 236,166천원

- 분할납부약속 ----------------------  4건  24,000천원

- 사망 ------------------------------  6건  69,869천원

- 거주불명(등기우편반송) ------------ 29건 171,200천원

도 로 과  소 관

ꊱ	자전거타기 활성화 사업 -------------------	27
ꊲ	중앙 분리대(화단) 설치 -------------------	28
ꊳ	안전한 도로시설물 관리 -------------------	29
ꊴ	자전거도로 확충 --------------------------	30
ꊵ	교통안전 시설물 확충 및 정비 -------------	31
ꊶ	장승백이길(남부순환도로) 개설-------------	32
ꊷ	남천로(전주천 좌안도로) 확장 -------------	33
ꊸ	녹두길(전주진입로) 확장 ------------------	34
ꊹ	한방병원～대학로간 확장 ------------------	35
	원대한방병원～가련교간 도로개설 ----------	36
	태평로 확장 ------------------------------	37
	견훤로 개설 ------------------------------	38
	남도주유소～고속터미널간 도로확장 --------	39
	동산고가교 부근 도로확장(동부우회도로) ---	40
	문화로 확장 ------------------------------	41
	은행로 확장 ------------------------------	42
	서남권 국도대체우회도로 ------------------	43
	북부권 국도대체우회도로 ------------------	44
	전주～광양간 고속도로 확장 건설사업 ------	45
	전주～논산간 고속도로 확장 건설사업 ------	46
	익산～전주～장수～대구～포항간 고속도로 건설사업 --	47

자전거타기 활성화 사업

○ 자동차 1천3백만대 시대의 심각한 도시교통․환경․에너지

문제 개선

○ 녹색환경도시 건설을 위한 시민의식 전환운동 전개로 자전거

이용 활성화

ꏚ 추진계획

○ 자전거동호회 결성 및 활성화 : 44개회 1,200명

- 동:40개/1,000명   단체:2개회/100명   대학:2개회/100명

○ 자전거이용시범학교 확대지정 : 20개교 ➪ 23개교

○ 주부자전거교실 운영 : 2개소(완산 거마공원, 덕진 종합경기장)

○ 초․중학생 자전거 안전교육 실시 : 년 6회 1,500명정도

○ 자전거타기 대행진 실시 : 3회

○ 주말자전거여행 실시 : 20회(4～6월, 9～11월)

ꏚ 추진실적

○ 동별 자전거동호회 결성 및 활성화 : 40개(회원 : 950명)

- 효자3, 서신, 우아2동 등 15개동 활성화

- 기타 동은 다소 미흡한 편임

○ 자전거이용 시범학교 확대지정 : 3개교(서중, 중앙중, 솔빛중)

○ 주부자전거 교실운영 : 2개소(완산 거마공원, 덕진 종합경기장)

○ 주말자전거여행 실시 : 15회

○ 자전거타기 대행진 실시 : 2회 2,600명

○ 전주시민 자전거대축제 실시 : 1회 4,000명

ꏚ 이후계획

○ 동별 자전거동호회 활성화 : 매주 1회 자전거타기 실시

○ 주말 자전거테마여행 실시 : 2회

○ 주부 자전거교실 운영 : 2개소

중앙분리대(화단) 설치

중앙분리대(화단) 설치로 중앙선 침범과 무단횡단으로 인한 교통

사고를 예방하여 고귀한 생명을 보호하고 녹색환경 도시건설

ꏚ 추진계획

○ 설치대상 : 4차선이상 도로(경전철 예정노선 제외)

○ 사 업 량 : 49개 노선 69㎞

○ 사 업 비 : 15,000백만원(국 7,500  시 7,500)

○ 사업기간 : 2002 ～ 2006

ꏚ 추진실적

○ 중앙분리대 정비계획 수립 ---------------------- 2003.06

○ 녹두길 외 13개 노선 19.2㎞ 설치완료

- 투자사업비 : 5,657백만원(국 2,607   시 3,050)

ꏚ 이후계획

○ 사 업 비 : 4,000백만원(국 2,000  시 2,000)

○ 설치계획 : 5개 노선 10㎞

- 월드컵로, 안덕로, 백석로, 쑥고개길, 남원선등

안전한 도로시설물 관리

ꏚ 사업개요

○ 사 업 량 : 105개소

※ 시설물 안전관리에 관한 특별법 대상 시설물 26개소

(1종 시설물 5개소, 2종 시설물 21개소)

○ 사업기간 : 2003～2007(5개년 단위 지속추진)

○ 사 업 비 : 10,700백만원

※ 2004년 사업비 : 515백만원(시비)

ꏚ 추진실적

○ 노후교량(남천교) 재가설 실시설계 용역

○ 2004년 노후교량 재가설 및 보수․보강공사 완료

- 원색장교 재가설(건교부 익산청 추진) : 1,045백만원

- 정밀안전진단 결과에 따라 삼례교 보수 :   500백만원

ꏚ 이후계획

○ 시특법 대상 정밀안전진단 및 정밀점검 실시

- 9개소(진단 2, 점검 7)

○ 노후교량 재가설 : 3개소 11,860백만원

(남천교, 삼천1, 산정교)

○ 안전점검결과에 따른 보수보강 : 8,000백만원

(삼례교, 동산육교, 다가교 등)

자전거도로 확충

ꏚ 사업개요

○ 사 업 량 : 자전거도로 99개 노선 325㎞

(자전거도로 135, 기타사업 190)

○ 사업기간 : 1997 ～ 2006년(10개년)

○ 사 업 비 : 32,500백만원

※ 2004년 소요예산 : 1,690백만원(국비 695  도비 150  시비 845)

ꏚ 추진실적

○ 2004년까지 자전거도로 252㎞, 자전거보관대 463개소 18,321대분

○ 2004년도 자전거도로 시범권역 우선순위에 의거 시행

- 완주공단 진입로 4.2㎞ 중 1.5㎞

- 아중․인후지역 5.0㎞,  덕진․송천지구 5.0㎞

※ 삼천, 만경강 등 하천내 자전거 레져도로 병행 추진

ꏚ 이후계획

○ 완주공단 진입로 자전거도로 공사중으로 년차별 시행

○ 금후 자전거 레져도로 사업시행 여부 검토 추진

교통안전 시설물 확충 및 정비

교통안전사고를 획기적으로 줄여나가기 위한 3년차 해로

시설의 확충 및 정비를 통한 안전하고 쾌적한 교통환경 조성

- 차량중심에서 교통약자인 보행자 중심으로 개선

ꏅ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 관내

○ 사업기간 : 2004.01 ～ 2004.12

○ 사 업 비 : 6,184백만원(국비2,478  시비3,706)

○ 사업내용

- 교통안전시설 확충정비(차선도색 외 7개사업) : 2,000백만원

- LED 신호등 설치 45개 교차로 : 772백만원(국비)

- 사고잦은지점 불합리한 교차로 구조개선 3개소 : 182백만원(국비50%)

- 어린이보호구역 정비 및 개선 11개교 : 3,230백만원(국1,615 시1,615)

※ 시비 미확보 ----- 590백만원

ꏅ 추진실적

○ 교통안전시설 확충정비 : 8개사업 2,000백만원

- 2004.04 공사착공(현공정 90%)

○ LED 신호등 설치사업 : 45개교차로 772백만원

- 2004.05 공사착공(현공정 100%)

○ 교통사고 잦은곳 구조개선사업 : 3개소 182백만원

- 2004.10 공사착공(현공정 20%)

○ 어린이보호구역 정비사업비(시비) 2회추경 요구 : 590백만원

ꏅ 이후계획

○ 교통안전시설 확충정비 지속추진 및 사업비확보 : 5,500백만원

○ 불합리한교차로 구조개선공사 지속추진 및 사업비확보 : 800백만원

장승백이길(남부순환도로) 개설

ꏅ 사업개요

○ 구   간 : 동서학동 좁은목 ～ 효자동 금구선(시의국도 27호선)

○ 사 업 량 : L= 7,250m   B= 25～35m

○ 사 업 비 : 114,579백만원(교부세 31,980  시비 82,599)

○ 사업기간 : 1988 ～ 2009

※ 2단계(함대부락～금구선) 1,570m ➪ 16,500백만원

ꏅ 추진실적(1단계공정 : 77%  투자액 : 73.423백만원)

○ 개    통 : 공수교～중인선(4,180m 61,279백만원) -- 1997

○ 용지매입 : 장승백이길 ～ 거산황궁ⓐ ～ 무궁화주유소

973m  9,310백만원

○ 토목공사 : 장승로～거산황궁ⓐ(640m 2,834백만원)

ꏅ 이후계획

○ 2005년 추진계획

- 구    간 : 장승백이길～거산황궁ⓐ～무궁화주유소(산성천)

- 사 업 량(용지매입 및 공사)

․ 용지매입(거산황궁ⓐ～산성천 480m   5,215백만원)

․ 공사(장승로～거산황궁ⓐ ～무궁화주유소 간 마무리 973m 2,800백만원

※ 예산요구 : 8,015백만원(교부세 4,015  시비 4,000)

○ 거산황궁ⓐ～좁은목(860m 16,641백만원) 사업추진

※ 2단계사업은 효자6지구로서 토개공에서 시행예정(2005～2011)

남천로(전주천 좌안도로) 확장

ꏅ 사업개요

○ 구    간 : 동서학동 한벽교～서신동 서신교(시의국도 1․27호선)

○ 사 업 량 : L= 4,150m   B= 8 ➪ 12～25m

○ 사 업 비 : 45,336백만원(교부세 27,200  시비 18,136)

○ 사업기간 : 1998 ～ 2007

※ 2단계(완산교～서신교) 2,140m ➪ 14,700백만원

ꏅ 추진실적(1단계공정 : 98.4%  투자액 : 30,149백만원)

○ 개 통 (L=1,810m   B=25m)

- 한 벽 교～싸전다리(L=1,050m) ------------ 2002.05

- 초록바위～완 산 교(L=  760m) ------------ 2003.12

○ 싸전다리～초록바위(L=  200m) ------------ 2004.12

- 채무부담 으로 사업 마무리(910백만원)

○ 2단계사업 실시설계용역(550백만원)  --------- 2005.06

ꏅ 이후계획

○ 2005년 추진계획

- 구   　간 : 완산교 ～ 다가교

- 사 업 량 ：용지매입 L= 900m

※ 예산요구 : 4,800백만원(교부세3,000  시비1,800)

○ 2단계사업 실시설계용역 마무리  ------------- 2005.06

○ 완산교 ～ 서신교(2,140m  10,387백만원) 사업추진

녹두길(전주진입로) 확장

ꏅ 사업개요

○ 구    간 : 원대한방병원 ～ 팔복동 BYC(시의국도)

○ 사 업 량 : L= 1,360m   B= 35 ➪ 50m

○ 사 업 비 : 17,000백만원(국비 5,000  양여금 7,200  시비 4,800)

○ 사업기간 : 1999 ～ 2006

ꏅ 추진실적(공정 45.0%  투자액 : 8,486백만원)

○ 개통(L=710m  B=50m)

- 원대한방병원～추천대교(L=710m) --------- 2003.12

○ 추천대교～동화약품(편도 L=300m)옹벽공사 -- 2004.12

ꏅ 이후계획

○ 2005년 추진계획

- 구    간 : 추천대교 ～ BYC

- 사 업 량 : L= 650m(편도)

․ 용지매입(동화약품～BYC) 마무리

․ 사업시행(추천대교～BYC) 마무리

※ 요구예산 : 4,000백만원(교부세 2,400  시비1,600)

○ 추천대교～BYC편도(L=650m  4,514백만원) 사업추진

한방병원～대학로간 확장

ꏅ 사업개요

○ 구    간 : 금암동 사대부고 ～ 녹두길(시의시도)

○ 사 업 량 : L= 2,630m   B= 25～35m

○ 사 업 비 : 27,000백만원(양여금 11,900  시비 15,100)

○ 사업기간 : 1995 ～ 2006

ꏅ 추진실적(공정 85.0%   투자액 : 22,800백만원)

○ 개  통(L=2,385m  B=25～35m)

- 사대부고～연화마을(L=1,200m B=25m) ------ 2001.12

- 송천삼거리 교차로 구조개선(L=130m B=35m) -- 2003.12

- 연화마을～덕진2치안센타(L=880m B=25m) -- 2004.12

ꏅ 이후계획

○ 2005년 추진계획

- 구    간 : 도립국악원 ～ 녹두길

- 사 업 량 : L= 300m  B= 35m

- 용지매입 마무리

※ 예산요구 : 2,500백만원(교부세 1,500  시비1,000)

○ 도립국악원～녹두길(L=300m  1,700백만원)사업추진

원대한방병원～가련교간 도로개설

ꏅ 사업개요

○ 구    간 : 원대한방병원 ～ 가련교간(시의시도)

○ 사 업 량 : L= 1,250m    B= 35m

○ 사 업 비 : 27,015백만원(교부세 16,052  시비 10,963)

○ 사업기간 : 2005 ～ 2008

ꏅ 추진실적(공정 1.3%  투자액 : 260백만원)

○ 기본 및 실시설계 추진(260백만원) ------------ 2003.11

ꏅ 이후계획

○ 2005년 추진계획

- 구    간 : 원대한방병원 ～ 가련교간

- 사 업 량 : L= 1,650m  B= 35.0m

․ 용지보상 등

※ 예산요구 : 3,000백만원(교부세 1,800 시비 1,200)

○ 원대 한방병원～가련교간(L=1,250m 23,755백만원) 사업추진

※ 하가지구 택지개발 시행(토개공) ---------- 2005～2007

태 평 로  확 장

ꏅ 사업개요

○ 구    간 : 대동길 ～ 구 MBC사거리(시의시도)

○ 사 업 량 : L= 900m    B= 13 ➩ 25m

○ 사 업 비 : 11,000백만원(교부세 6,600  시비 4,400)

○ 사업기간 : 2004 ～ 2008

ꏅ 추진실적(공정 5.0%   투자액 : 743백만원/양여금)

○ 편입토지 및 건물보상 협의(대동길～농협 하나로마트) -- 2004.12

ꏅ 이후계획

○ 2005년 추진계획

- 구    간 : 농협 하나로마트 ～ 구 연초제조창

- 사 업 량 : L= 300m  B= 25m

∙ 용지보상 등

※ 예산요구 : 922백만원(교부세 553, 시비369)

○ 대동길 ～ 구MBC사거리 구간(L=900m 9,335만원)사업추진

견 훤 로   개 설

ꏅ 사업개요

○ 구    간 : 중노송동 마당재 ～ 교동 기린로(시의시도)

○ 사 업 량 : L= 1,650m    B= 30m

○ 사 업 비 : 27,000백만원(시비)

○ 사업기간 : 1999 ～ 2007

ꏅ 추진실적(공정 45.0%   투자액 : 13,820백만원)

○ 개 통 : 마당재～기린봉ⓐ(L=560m) --------- 2001.12

○ 용지매입완료 : 기린봉아파트～농원마을(220m) -- 2003.12

○ 매입건물 철거 및 폐기물처리 ------------------ 2004.09

※ 도로선형 변경을 위하여 도시계획 재정비에 반영 추진 중

ꏅ 이후계획

○ 2005년 추진계획

- 실시설계 용역 추진

- 편입토지 및 건물보상 협의

※ 예산요구 : 500백만원(시비)

○ 용지보상 및 공사(12,680백만원)

남도주유소～고속터미널간 도로확장

ꏅ 사업개요

○ 구    간 : 금암동 남도주유소 ～ 고속터미널간(시의시도)

○ 사 업 량 : L=  500m    B= 20 ➪ 25m

○ 사 업 비 : 8,000백만원(시비)

(보도 조성시 600백만원)

○ 사업기간 : 2004 ～ 2008

ꏅ 추진실적(투자액 : 200백만원/도비)

○ 도시계획변경(25➪20m)을 위하여 재정비에 반영 추진 중

※ 확보예산(200백만원) : 명시이월

ꏅ 이후계획

○ 구  간 : 남도주유소 ～ 고속터미널

○ 사업량 : L= 500m, 보도폭 4m(양측) 600백만원

- 실시설계 용역

- 보도조성 마무리

※ 도시계획 변경 결정에 따라 기확보예산(200백만원)으로

인도조성 추진

동산고가교 부근 도로확장(동부우회도로)

ꏅ 사업개요

○ 구    간 : 동산동 동산고가교 ～ 동산역(시의시도)

○ 사 업 량 : 연장  340m   폭 18.5 ➩ 35m

○ 사 업 비 : 2,990백만원(시비)

○ 사업기간 : 2003 ～ 2005

ꏅ 추진실적(공정 : 7.0%  투자액 : 840백만원)

○ 용지매입완료(10필지 779㎡/200백만원) ------ 2003.12

○ 동산가교～동산역 상행선(L=340m/640백만원) -- 2005.03

- 공사입찰 예정 : 2004.11.29

ꏅ 이후계획

○ 구    간 : 동산고가교 ～ 동산역(하행선)

○ 사업량(공사마무리) : L=340m B=8.25m / 2,150백만원

※ 예산요구 : 2,150백만원(시비)

문 화 로  확 장

ꏅ 사업개요

○ 구    간 : 중노송동 정보영상진흥원 ～ 전주고(시의시도)

○ 사 업 량 : L= 220m    B= 22 ➩ 25m

○ 사 업 비 : 1,281백만원(시비 831,  민자 450)

○ 사업기간 : 2004 ～ 2005

ꏅ 추진실적(공정 30%,  투자액 : 920백만원)

○ 실시설계용역완료 -------------------------- 2003.12

○ 전주고 구간 용지매입 완료 ----------------- 2004.07

○ 국유지 무상관리환(4필지 205㎡) ----------- 2004.09

○ 학교구간 공사 추진(마무리) ---------------- 2004.11

ꏅ 이후계획

○ 구    간 : 진안사거리～정보영상진흥원

○ 사 업 량 : L= 30m  B= 22➩25m

- 용지매입 및 공사 마무리(361백만원)

※ 요구예산 : 361백만원 (시비)

은 행 로  확 장

ꏅ 사업개요

○ 구    간 : 남천교 ～ 동부시장(시의시도)

○ 사 업 량 : L= 980m   B= 8➩10m

○ 사 업 비 : 7,000백만원(교량 가설비 3,000백만원 포함)

○ 사업기간 : 2005 ～ 2006

ꏅ 추진실적(투자액 200백만원/시비)

○ 실시설계용역 마무리 ------------------------ 2004.12

- 도로폭원 및 마감재 결정을 위하여 한옥보존위원회 협의

ꏅ 이후계획

○ 2005년 추진계획

- 남천교 가설공사 마무리(L= 80.5m  B= 16m)

- 남천교～동부시장 구간 편측(L= 980m)

․ 용지보상 등

※ 예산요구 : 5,000백만원(시비)

○ 남천교 ～ 동부시장 편측(980m 2,000백만원) 공사 및 지중화

서남권 국도대체우회도로

국가사업

ꏅ 사업개요

○ 위    치 : 완주군 상관～구이～이서～용정～익산시 춘포

○ 사업규모 : 33.4㎞(폭 20m)

○ 사 업 비 : 4,864억원(국비 4,586억  시비 278억)

○ 사업기간 : 1998 ～ 2010년(13년)

○ 시 행 청 : 익산지방국토관리청

ꏅ 추진실적

○ 총 공 정 : 56%(공사 48%  보상 65%)

○ 투자실적 : 2,699억원(국비 2,505  시비 194)

- 2004년 예산확보 : 178억원(국비 176  시비 2)

※ 보상실적(67.5%) : 213,500평/ 530필지(194억원)

ꏅ 이후계획

○ 3개공구 보상추진 : 339,642㎡(102,741평) / 284필지

- 구이～이서 :  10,419㎡( 3,151평) /  64필지

- 이서～용정 :  55,368㎡(16,748평) /  80필지

- 용정～춘포 : 273,855㎡(82,841평) / 140필지

※ 지 장 물 : 상수도․통신이설철탑3개, 문화재 시굴조사,

분묘이장,  등

➲ 2005년 예산요구 : 총 384억원(국비 340억, 시비 44억)

- 2005년 보상계획 : 44억원( 85.6% )

※ 구간별 완공계획년도 : 상관~구이(2004년), 구이~이서(2007년)

이서~용정(2006년),  용정~춘포(2010년)

북부권 국도대체우회도로

국가사업

ꏅ 사업개요

○ 사업구간 : 조촌 용정～아중역(금회)～동서학동 색장리(장래)

○ 사업규모 : L= 18.6㎞   B= 20m

○ 사업기간 : 2003 ～ 2011년(9년)

○ 사 업 비 : 약3,040억원(국비 2,790  시비 250)

○ 시 행 청 : 익산지방국토관리청(보상 : 전주시)

ꏅ 추진실적

○ 기본 및 실시설계 용역중(37억원) --- 2003.07~2005.07

○ 노선확정 협의 중(건설교통부) ------- 2004.08

- 우리시에서 요구한 [1안]으로 검토 중에 있음

※ 노선 비교(안)

[1안] 조촌 용정～용진～산정동～아중역(제방도로 이용) 18.6㎞

[2안] 조촌 용정～용진～산정동～아중역  17.0㎞

[3안] 조촌 용정～용진～금상동(소양선)  15.4㎞

ꏅ 이후계획

○ 노선확정 ----------------------------------- 2004.11

○ 기본 및 실시설계 용역 완료 ----------------- 2005.07

○ 공사착공 ----------------------------------- 2006.03

※ 행정수도 이전에 따른 북부권 도시발전을 위해서 [1안]으로

결정될 수 있도록 지속협의 추진

전주~광양간 고속도로 건설사업

국가사업

ꏅ 사업개요

○ 위    치 : 전주 ～ 전남 광양

○ 사업규모 : 117.8㎞(전북구간 72.7㎞)

○ 총사업비 : 3조원 정도

○ 사업기간 : 1998 ～ 2011년 (14년간)

○ 시 행 청 : 한국도로공사

ꏅ 추진실적

○ 기본 및 실시설계․환경영향평가 등 행정절차 완료 - 2003.12

○ 편입토지 공람공고 완료 ---------------------- 2004.04

○ 전주～임실구간(1-6공구 37㎞) 우선발주 건의 - 2004.08

- 건의기관 : 전라북도(도로과), 한국도로공사(건설계획처)

※ 도로공사 회신(2004.08.30) : 금년내 착공목표로 관계

기관과 인․허가 협의 중

○ 도로구역 결정고시(건교부 고시 2004-224) --- 2004.09

○ 공사입찰공고(전주~임실구간 : 37.89㎞) ----- 2004.10.11

- 소요사업비 737,266백만원(공사비732,512  자재대4,754)

○ 적격자 선정 발표 -------------------------- 2004.11.04

○ 현장설명 ---------------------------------- 2004.11.11

ꏅ 이후계획

○ 공사입찰 --------------------------------- 2004.12.15~16

○ 공사착공 ---------------------------------- 2004.12

전주~논산간 고속도로확장 건설사업

국가사업

ꏅ 사업개요

○ 위    치 : 전주 ~ 논산

○ 사업규모 : 24.7㎞(전주~익산 14㎞,  익산~논산 10.7㎞)

○ 총사업비 : 3,500억

○ 사업기간 : 2002 ~ 2008년 (7년간)

○ 시 행 청 : 한국도로공사

ꏅ 구간별 추진개요

○ 1공구 : 10.7㎞(논산~익산IC) 왕복 8차선

○ 2공구 : 14.0㎞(익산IC~전주) 왕복 6~8차선

※ 익산 ~ 전주구간 확장계획

- 익산IC～익산JCT(익산～장수간 고속도로 접속지점) : 8차선

- 익산JCT～전주 : 6차선

ꏅ 추진실적

○ 기본 및 실시설계완료 ------------------------ 2004.10

ꏅ 이후계획

○ 공사착공 ------------------------------------ 2005

○ 공사준공 ------------------------------------ 2008

익산~전주~장수~대구~

국가사업

포항간 고속도로 건설사업

ꏅ 사업개요

○ 위    치 : 익산 ~ 전주 ~ 장수,  대구 ~ 포항

○ 사업규모 : 129.4㎞(익산~전주~장수 61㎞. 대구~포항 68.4㎞)

○ 총사업비 : 3조 1,149억원

- 익산~장수 : 1조 1,249억원

- 대구~포항 : 1조 9,900억원

○ 사업기간 : 1997 ～ 2008년(12년간)

○ 시 행 청 : 한국도로공사

ꏅ 구간별 추진개요

○ 익산 ~ 장수 : 61.0㎞ ------------ 2001～2008(8년간)

○ 대구 ~ 포항 : 68.4㎞ ------------ 1997～2005(9년간)

ꏅ 추진실적

○ 익산 ~ 장수간 : 공정 30%

○ 대구 ~ 포항간 : 공정 95%

ꏅ 이후계획

○ 대구 ~ 포항간 개통 ----------------------- 2004.12

교 통 과  소 관

ꊱ	시내버스 정보안내시스템(BIS) 구축 -------	49
ꊲ	교통신호 운영체계 개선 -------------------	50
ꊳ	교통정체지역 특별소통대책 추진 -----------	51
ꊴ	가련산공원 주차장 조성 -------------------	52
ꊵ	전주경전철 건설 --------------------------	53

시내버스 정보안내시스템(BIS) 구축

시내버스 운행과 관련된 각종 정보의 실시간 제공 및 효율적인

운행관리를 통해 대중교통 서비스 향상 및 이용 활성화 도모

ꏚ 사업개요

○ 사업내용

- 도로장치 : 노변기지국 193식, 정류장 안내단말기 104개

- 차량장치 : 차량용단말기 410개, 차량내 안내단말기 94개

- 기    타 : 키오스크(KIOSK) 11개, 대형 LCD 정보판 등

○ 대상노선 : 팔달로, 충경로 등 14개 노선

○ 사 업 비 : 3,432백만원

○ 사업기간 : 2003.10~2004.08(10개월)

ꏚ 추진실적

○ 시스템 설치 완료 --------------------------- 2004.04.30

- 정류장안내단말기, 노변기지국, 차량용단말기, 차량안내단말기

키오스크 등

- 센터시스템 구축 및 상황실 구축 완료 ------- 2004.03.30

○ 통신망 개통 완료 --------------------------- 2004.06.10

○ BIS운영 S/W개발 완료 -------------------- 2004.07.31

○ 시험운영 및 시스템안정화 ------------------- 2004.08～12

ꏚ 이후계획

○ 2단계 시내버스정보화사업 추진 ------------- 2005.01～12

- 사 업 비 : 35억원

- 사업내용 : 정류장안내단말기 150개, 노변기지국 150개,

노선번호표시기 316개, 센터시스템 1식 등

교통신호 운영체계 개선

○ 전자신호와 신신호체계의 통합운영 및 신신호체계의 지속적인

확장․개선으로 교통소통 촉진을 통한 간선도로 기능 회복

○ 교차로․가로구간의 교통량 분석 및 DB구축으로 신호운영 개선

ꏚ 현    황

○ 교통신호 제어기 307개 (전자신호 245  신신호 62)

- CCTV 35, VMS 17, 잔여표시기 470, 음향신호기 150

ꏚ 사업개요

○ 사업내용

- 교통신호제어시스템 개선(신호운영통합, 연동화)

- 교통상황관제(CCTV) 및 상황판 개선

- 교통안전교육실 신설

○ 사업기간 : 2004.12～2005.12

○ 사 업 비 : 4,400백만원(국비)

ꏚ 추진실적

○ 전문가 자문회의(사업내용검토) ------------- 2004.04.27

○ 기본설계 완료 ----------------------------- 2004.05.01

○ 발주사전심사(감사담당관실) ---------------- 2004.09.01

○ 사업계약의뢰(조달청) ---------------------- 2004.09.21

○ 사전규격공고(조달청) ---------------------- 2004.10.01～07

ꏚ 이후계획

○ 사업자선정 및 사업착수 -------------------- 2004.12

○ 시스템 구축 ------------------------------- 2005.09

○ 시험운영 및 사업완료 ---------------------- 2005.12

교통정체지역 특별소통대책 추진

○ 교통정체지역 특별관리로 교통 소통 도모

○ 교통정체지역 현장점검 및 결과 분석으로 소통 개선

ꏚ 추진지표

○ 평일 첨두시 평균속도 15㎞/시 미만구간 ⇨ 20㎞/시 이상

- 통일광장～경기장4거리(백제로)등 7개노선 총연장 15㎞

- 통일광장(롯데백화점) 등 정체교차로 65개소

ꏚ 추진방안

○ 교통정체지역 교통량 조사 및 기하구조 개선 수립 용역 시행

- 용 역 비 : 150백만원

- 용역내용 : 정체 및 혼잡 교차로 기하구조 개선 수립 등

- 용역기간 : 2004.06 ～ 2005.05

○ 불법주정차 무인단속시스템 구축

- 사 업 비 : 150백만원

- 사업내용 : 교통소통 장애 불법주정차지점 단속카메라설치(3개소)

- 사업기간 : 2004.11 ～ 2005.02

ꏚ 추진실적

○ 교통운영개선(TSM) 용역 시행 ---------------- 2004.06

○ 상습정체구간 교차로 교통량조사(80개소) ------- 2004.07

- 교통신호지역 제어기 연동화 및 주기조정 : 20개소

○ 타시 사례 벤치마킹(서울 강남구, 인천, 청주 등) -- 2004.07

ꏚ 이후계획

○ 교통량 및 교차로 기하구조 조사 : 수시

○ 불법주정차 무인단속 시스템 구축 ---- 2004.11～2005.02

○ 교통운영개선용역 중간 보고회 ----------------- 2004.12

○ 교통운영개선용역 최종 보고회 및 용역완료 ----- 2005.05

가련산공원 주차장 조성

○ 자동차의 급격한 증가로 인한 도시주차문제에 적극적으로

대처하기 위하여 가련산공원 주차장 시설지구에 공영주차장을

조성하여 시민들에게 주차편의 제공

ꏅ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 덕진동 2가 224-3번지 외 8필지

○ 규    모 : 2,595㎡(785평)  ※ 주차능력 : 72면

○ 사업기간 : 2003.06～2005.08

○ 사 업 비 : 720백만원(토지매입179, 공사비541)

※ 2004년 예산확보 : 420백만원

ꏅ 추진실적

○ 주차장 시설계획 수립 ------------------------ 2002.04

○ 실시설계 완료 ------------------------------- 2003.06

○ 사업시행인가 -------------------------------- 2003.07

○ 편입토지 협의매입 완료(7필지 2,205㎡) ------ 2004.10

※ 미 매입토지(1필지 21㎡) 지속적으로 협의 : 협의매수 불응시 토지수용

ꏅ 이후계획

○ 공사발주 ------------------------------------ 2004.11

○ 착    공 ------------------------------------ 2004.12

○ 준    공 ------------------------------------ 2005.08

전주경전철 건설

자동차의 급증과 도로시설 공급의 한계로 인하여 계속 심화되고 있는

도심지역의 심각한 교통난 해소 및 고품질의 대중교통서비스 제공

- 정시성, 안전성, 대량수송이 가능한 무공해 신 대중교통수단 도입 -

ꏚ 사업개요

○ 시스템 및 노선연장 : 노면전차(Tram),  24.29㎞

- 1단계(2010) : 송천역～한방병원～팔달로～평화광장～ 삼천농협공판장(14.19㎞)

- 2단계(2013) : 전주역～백제로～곰솔나무길～평화광장～평화 3지구(10.10㎞)

○ 사 업 비 : 4,671억원(국비930  도비465  시비487  민자2,752)

○ 사업기간 : 2001～2013(13년간)

ꏚ 추진실적

○ 국토연구원 민간투자지원센터(PICKO)사업성 검토 - 2004.01.26

- 검토결과 : 민간투자사업으로 추진 가능

○ 전주시교통정책자문위원회구성 운영(13회) -- 2004.03～10

- 시민여론조사로 사업추진여부 결정 및 운수업계 애로해결․협의 병행

○ 전주경전철 건설사업 전주시민 설문조사 실시 -- 2004.06.07

- 유효표본 1,559명 중 찬성 67.9%  반대 27.9%  무응답 4.2%

○ 도시철도기본계획승인요청(전주시⇨전라북도) -- 2004.07.07

○ 전주경전철사업 기본설계 발주 ---------------- 2004.11

ꏚ 이후계획

○ 도시철도기본계획승인요청(전북도⇨건설교통부) - 2004.12

○ 민간투자대상사업 지정 신청(전주시⇨기획예산처) - 2004.12

○ 도시철도기본계획 승인 및 민간투자대상사업 지정 -- 2005년 상반기

하 수 과  소 관

ꊱ	하수처리장 3단계(1차) 증설사업 ----------	55
ꊲ	하수처리장 1․2단계 고도처리사업 --------	56
ꊳ	하수처리장 슬러지처리 시설사업 -----------	57
ꊴ	화산․덕진처리구역 하수관거 정비사업 -----	58
ꊵ	농촌마을 하수도 정비사업 -----------------	59
ꊶ	금암동주변 하수관거 정비사업 -------------	60
ꊷ	삼천 자연형하천 조성사업 -----------------	61
ꊸ	만경강 생태하천 가꾸기 사업 --------------	62
ꊹ	재난․방재업무 추진 ----------------------	63

하수처리장 3단계(1차) 증설사업

○ 인구증가로 급속히 증가하는 하수를 원활히 처리하여 수질

개선 및 환경보존

○ 하수량증가로 인한 방류수역인 전주천, 만경강, 새만금 유역

수질오염 방지

ꏅ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 송천동2가 1035번지 일원

○ 사업규모 : 100천㎥/일, 오수유입 관로정비 L=5㎞

○ 총사업비 : 79,705백만원(양 37,542 지 31,563 민투 10,600)

※ 2004예산 : 20,099백만원

○ 사업기간 : 1998 ～ 2005.12

ꏅ 추진실적(공정 90%)

○ 민간위탁 협약 ------------------------------- 2002.02

○ 공 사 착 공 --------------------------------- 2002.05

○ 주요구조물 완료(생물반응조,소독조,여과지등) ---- 2004.05

○ 건축구조물 및 부지조성 완료 ----------------- 2004.06

○ 기계, 전기, 계장 ---------------------------- 2004.09

○ 3단계증설 시운전, 부분준공 ------------------ 2004.11

ꏅ 이후계획

○ 1,2,3단계 민간위탁운영(전주개발) ----------- 2004.12

○ 조경공사 및 오수유입 관로정비 -------------- 2005.12

하수처리장 1‧2단계 고도처리사업

○ 2001.09월 하수도법 개정으로 강화된 수질기준에 맞게

하수처리장 고도처리시설 개선

○ 만경강 새만금 수질개선을 위한 고도처리 공법 도입필요

ꏅ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 송천동2가 1035번지 일원

○ 사업규모 : 303천톤/일

○ 총사업비 : 60,000백만원(양 30,000  지 30,000)

※ 2004예산 : 2,134백만원

○ 사업기간 : 2002.03 ～ 2007.

ꏅ 추진실적

○ 기본계획 및 입찰안내서 작성 용역 -- 2002.06～2003.10

○ 고도처리사업 실시설계 적격업체결정(조달청) -- 2004.03

○ 실시설계 ---------------------------- 2004.04~2004.08

○ 실시설계적격 심의 완료 --------------------- 2004.09

○ 공사착공(30개월) --------------------------- 2004.10

ꏅ 이후계획

○ 공사준공 ----------------------------------- 2007.07

하수처리장 슬러지 처리 시설사업

○ 하수슬러지 해양투기로 인한 해양오염을 예방하고 소각 및

자원화 등 처리방법을 검토하여 최적의 방안 시설

○ 해양투기 금지로 인한 하수슬러지 처리문제를 사전 대처

ꏅ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 송천동 2가 1035번지 일원

○ 사업규모 : 150톤/일

○ 총사업비 : 14,000백만원(양 7,000   지 7,000)

※ 2004년 예산 : 2,884백만원

○ 사업기간 : 2003 ～ 2006.12

ꏅ 추진실적

○ 전주시 설계자문회의 ------------------------- 2003.03

○ 기본 및 실시설계중(진도 80%) --------------- 2003.08

○ 관계전문가 자문(전주시 자문위원 전문가 9명) ---- 2004.06

ꏅ 이후계획

○ 실시설계완료  ------------------------------- 2004.12

○ 환경성검토 및 실시계획인가 등 행정절차 이행 --- 2004.12

○ 슬러지 처리시설 착공 및 준공 ------ 2005.02~2006.12

화산․덕진처리구역 하수관거 정비사업

급격한 도시확장 인구증가 우․오수 미분리 불명수 유입 등으로

하수량이 매년 증가되어 하수처리장 증설요인을 제공하므로서,

증설에 따른 막대한 예산이 소요되는바 근본적 원인을 제거하기

위하여 하수도 정책을 우․오수 분리사업으로 전환(환경부정책)

ꏅ 사업계획

○ 위    치 : 화산처리구역 1․4․7분구, 덕진처리구역 1분구

○ 사업규모 : 관거정비 70㎞

○ 사 업 비 : 39,728백만원(국 19,864  시 19,864)

※ 2004예산 : 4,052백만원

○ 사업기간 : 2004.03 ~ 2007.12

ꏅ 추진실적

○ 기본 및 실시설계 완료 ------------------------- 2003.09

○ 공사발주 의뢰(조달청) ------------------------- 2003.12

○ 시공업체선정(조달청) 및 착공 ------------------ 2004.04

○ 관련 주민 사업설명회 개최 --------------------- 2004.06

○ 1.2차공사 시행 (동서학동 산성천주변, 덕진동 호반촌)

- 하수관거 정비 L = 6.7㎞(현공정 30%)

○ 동절기 이전 주요노선 관거매설 및 포장복구 완료 ---- 2004.11

ꏅ 이후계획

○ 1,2차공사구간 완료 및 3차공사(대학병원주변) 시행 -- 2005.03

농촌마을 하수도 정비사업

농촌동 마을하수도가 적정 처리되지 않고 직접 방류되므로 하천

수질오염이 가중되어 연차적으로 마을하수도 시설을 정비하여

수질오염 방지

ꏅ 사업계획

○ 위    치 : 전주시 관내 농촌마을

○ 사업규모 : 마을단위 소규모 하수처리시설(50톤/일～500톤/일)

○ 사업대상 : 3개 마을

○ 사업규모 : 190톤/일

○ 사 업 비 : 2,272백만원

※ 2004년 예산 : 289백만원(용역비)

○ 사업기간 : 2004 ～ 2006(3개년)

ꏅ 추진실적

○ 실태조사(구청, 동) ----------------- 2004.05～2004.06

- 해당동 39개마을 신청

○ 현지확인(39개마을) 및 검토 ----------------- 2004.07

- 전주하수종말처리장 유입가능 여부, 지형적 조건, 취락형태,

하수발생량 등 검토

○ 용역과제 심의 ------------------------------- 2004.11

ꏅ 이후계획

○ 기본계획 및 실시설계 용역 ---------- 2004.12～2005.04

○ 용지매입 및 공사시행 --------------- 2005.05~2006.12

금암동 주변 하수관거 정비사업

기존 하수관거 단면 부족으로 약간의 집중 호우시에도 도로 및

주택이 상습적으로 침수되어 이를 해소하기 위함

ꏅ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 금암동 일원

○ 사업규모 : 하수도시설  L=3.12㎞

○ 총사업비 : 3,327백만원(양1,631  시1,696)

※ 2004년 예산 : 422백만원(양 261, 시비 161)

○ 사업기간 : 2002.12 ~ 2005.09

ꏅ 추진실적(공정 65%)

○ 공  사  착  공 ------------------------------- 2002.12

○ 고속버스터미널앞~태평양수영장앞 하수관거매설 완료 -- 2004.11

- L= 2.2㎞(PC박스 및 오수관로)

ꏅ 이후계획

○ 구 남북로~금암초등학교 PC박스 매설 및 준공 -- 2005.09

삼천 자연형하천 조성사업

전주․삼천, 만경강에 이르는 『전국에서 가장 깨끗한 하천

가꾸기 사업』을 지속적으로 추진하여 건강한 녹색복지도시

건설 및 새만금 수질개성에 기여

ꏚ 사업개요

○ 위치(구간) : 완산구 삼천동 삼천교 ～ 추천대교

○ 사업규모 : 8.05㎞

○ 사 업 비 : 9,819백만원(양여금 6,027, 시비 3,792)

○ 사업기간 : 2000 ～ 2005 (6개년)

※ 2004년 예산 : 2,700백만원(시비 1,200  이월 1,500)

ꏚ 추진실적(공정 78%)

○ 공사착공 ------------------------------------ 2001.12

○ 차집관로(오수관) 매설  1,600m ------------- 2002.09

○ 낙차공개량 및 어도설치  3개소 --------------- 2003.07

○ 수질정화습지  1개소 ------------------------- 2004.07

○ 자연형 호안조성(자연석쌓기) 3,039m -------- 2004.12

○ 자전거도로 개설  5,800m ------------------- 2004.12

ꏚ 이후계획

○ 자연형 호안조성(자연석 쌓기) 343m --------- 2005.07

○ 자전거 도로개설(좌안) 8,400m -------------- 2005.12

○ 수질정화습지 및 수생식물 식재 1개소 --------- 2005.12

○ 행사광장 및 다목적운동장 1개소 -------------- 2005.12

○ 조경시설  1개소 ----------------------------- 2005.12

만경강 생태하천 가꾸기사업

전주․삼천,만경강에 이르는 『전국에서 가장 깨끗한 하천

가꾸기사업』을 지속적으로 추진하여 건강한 녹색복지도시

건설 및 새만금 수질개선에 기여

ꏚ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 팔복동 추천대교 ～ 만경강 합류

○ 사업규모 : 7.9㎞(전주천 5.7㎞, 만경강 2.2㎞)

○ 사 업 비 : 16,637백만원(국비10,257.양여금515.도비598.시비5,267)

○ 사업기간 : 2001 ～ 2010년(10개년)

※ 2004년 예산 : 2,044백만원(국비 1,605  시비 439)

ꏚ 추진실적(공정 23%)

○ 일반하천 개수사업(조경석 호안쌓기):1,858m -- 2002～2003.12

○ 실시설계 완료(사전환경성 검토서 포함) ------ 2003.09

○ 익산지방국토관리청 협의(비관리청사업 인가) --- 2004.03

○ 공사총괄발주 7.9㎞ ------------------------- 2004.09

○ 착공 --------------------------------------- 2004.11

- 자전거도로 개설 3.27㎞ ------------------- 2004.12

ꏚ 이후계획

○ 저수호안 조경석쌓기 4.8㎞ ------------------ 2005.12

○ 자전거도로 개설 10.0㎞ --------------------- 2005.12

○ 오염하천정화시설 및 운동시설 1식 ----------- 2006～

○ 공사 완공예정 ------------------------------ 2010

※ 연차별 예산확보상황에 따라 차수별 계속사업으로 추진

재난 방재 업무추진

ꏚ 재난방재 현황

○ 특정관리대상시설  지정현황                (2004.11현재)

구 분	총계	중점관리대상시설				재난위험시설
		소계	A등급	B등급	C등급	소계	D등급	E등급
합 계	1211	1197	1084	74	39	14	14	0
건축물	1182	1169	1075	62	32	13	13	0
시설물	29	28	9	12	7	1	1

○ 재난관리기금 관리 현황

(단위 : 백만원)

구 분	법정액	확보액	미확보액	사용액	사용잔액 (이자포함)
재난관리기금	7,254	6,358	896	950	5,946

○ 주요 자연재해 및 인위 재난 발생

(단위 : 건수)

계	태 풍	집중호우	화 재	윤 화	기 타
3,527	2	1	201	3,320	3

○ 기상특보 발령사항 :12회(경보 4, 주의보 8)

- 1일 최대 강우량 : 99㎜(2004.06.21 : 시우량 52㎜)

- 2004.11월 현재 누적강우량 : 1,362㎜

ꏚ 추진실적

ꊱ 사전대비

○ 해빙기 안전점검 실시 : 제방, 축대 절개지등 132개소

○ 위험시설 보수보강 : 하천제방 등 3개소 70백만원

○ 농업용수 시설물 긴급 보수 실시 : 소류지 4개소277백만원

○ 특정관리대상 시설물 안전점검 1,211개소 : 연2회(D급 월1회)

○ 기초생활수급대상자 생활안전시설 개선사업

- 사 업 비 : 45백만원

- 사업규모 : 426세대(전기, 가스시설 개선)

ꊲ 사후복구

○ 호우피해(2004.06.19~21) 발생에 따른 복구 -- 입찰중

- 사 업 비 : 688백만원(국비116  도비228  시비344)

- 복구규모 : 농로교량 1개소, 하천제방 1개소

ꊳ 안전교육 및 훈련

○ 안전체험교육(시민, 학생, 공무원) 실시 : 15회(4,500명)

○ 재난대비 실제훈련 : 3회

- 긴급구조 훈련(소방서, 군부대, 경찰서 등 유관기관 합동)

- 유선상 사고 가상훈련(소방서, 경찰서 합동)

- 대 테러대비 재난훈련 실시 ---- 롯데 백화점

(소방서, 군부대, 경찰서 등 유관기관합동)

○ 안전점검의 날 행사실시 : 15회

ꏅ 이후계획

○ 호우피해 현장에 대한 복구공사가 조속히 완료토록 적극 추진

○ 겨울철 재난사고 예방을 위한 다각적인 주민 홍보 실시

도시발전기획단 소관

ꊱ	전주서부 신시가지 도시개발사업 ----------	66
ꊲ	연초제조창 부지 활용방안 ----------------	67
ꊳ	전주도시첨단산업단지 조성 추진 ----------	68
ꊴ	35사단 이전 --------------------------	69

전주서부신시가지 도시개발사업

ꏅ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 효자동 일원

○ 규    모 : 76만평

○ 사 업 비 : 4,185억원

○ 사업기간 : 1999 ～ 2006(8개년)

○ 사업방식 : 도시개발법에 의한 도시개발사업(환지＋수용)

ꏅ 추진실적  --------------------------- 1,353억원(32%)

○ 편입 토지 및 지장물 보상

- 대 상 : 2,564건  85,500백만원

- 실 적 : 1,962건  716억원 (83.8%)

○ 공사 추진 : 637억원

- 경찰청주변 기반시설 완료

- 삼천2교(도청옆) 하부구조 추진

- 도청주변 간선도로 5개노선 4.0㎞ 도로개설 추진

- 매립쓰레기 굴착 및 선별

- 문화재 시굴 완료

○ 체비지 매각 : 302필지 / 2,710억원(금액대비 68.2%)

- 공 개 : 292건  2,317억원

- 수 의 :  10건     393억원(공공 및 일반업무용지)

ꏅ 이후계획

○ 전기 및 조경공사 발주   ------------------- 2005.02

○ 토지․지장물 등 보상 완료  ---------------- 2005.05

○ 도청주변 기반시설 및 삼천 2교 완료 -------- 2005.06.30

○ 문화재  발굴조사 완료 --------------------- 2005.10

연초제조창부지 활용방안 추진

ꏅ 현 황

○ 부지면적 : 71,050㎡(21,493평), 제2종일반주거지역

○ 시설규모 : 연면적 110,179㎡(33,329평), 제조기계 등

○ 폐창일자 : 2002.06.18

ꏅ 추진실적

○ 연초제조창부지 토지이용계획 협의(안)

계	공동주택부지	문화복합부지	공원부지 (기부채납)	도로부지 (기부채납)	잔여지
21,493평 (100%)	14,066평 (65.5%)	1,513평 (7.0%)	5,279평 (24.6%)	566평 (2.6%)	69평 (0.3%)

○ 18층 이하, 용적률 260% 이내 건축규모 의견 제시 -- 2004.07.06

- KT&G측 우리시 제시ꡒ안ꡓ적극수용 추진의사 표명

○ 지구단위계획수립, 사업계획승인을 위한 업체선정 - 2004.10.01

- (주)토문 엔지니어링 건축사사무소

ꏅ 이후계획

○ KT&G측  개발타당성 용역검토 및 지구단위계획, 교통영향

평가 심의 연내 절차이행

○ 2005년 상반기 사업계획 승인 및 공사 착공 추진

- KT&G측 현재 부동산 경기와 관련 분양시기 조정 계획 임

전주도시첨단산업단지 조성 추진

ꏅ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 팔복동 2가 728 일원(도공무원교육원 인근)

○ 사업규모 : 단지조성  32,845평(103필지  108,580㎡)

○ 사 업 비 : 256억원(기반조성85  용지보상164  기타7)

- 기확보 예산액 : 10,143백만원(시비)

○ 사업기간 : 2003 ~ 2007(5년간)

ꏅ 추진실적

○ 전주도시첨단산업단지 조성계획 수립 ------- 2003.02.24

○ 조사.설계 용역 계약  --------------------- 2004.02.25

○ 도시첨단산업단지 지정승인 및 고시 -------- 2004.09.08

○ 보상계획 공고  --------------------------- 2004.10.18

○ 도시첨단산업단지 실시계획 승인신청  ------ 2004.10.22

○ 감정평가 결과 통보 ----------------------- 2004.11.06

ꏅ 문제점 및 대책

○ 기반조성비(85억) 및 보상비등(69.9억) 미확보로 보상협의 및
사업 발주 지난

- 2004년 결산추경(30억) 및 2005년 본예산(39.9억) 확보

- 기반조성 사업은 국․도비 확보 후 사업 발주

ꏅ 이후계획

○ 용지보상 및 문화재 시굴조사 --------- 2004.11~2005.03

○ 기반조성 공사 발주 ------------------ 2005예산 확보후

35사단 이전

ꏅ 사업개요

○ 기존부지

- 위   치 : 덕진구 송천동, 전미동 일원

- 면   적 : 35만평 (건축면적 1만5천평) ※ 항공대 9.6만평

○ 이전규모 : 부지면적 150여만평, 건축면적 4만3천평

○ 사업기간 : 2005 ~ 2009년

ꏅ 추진상황

○ 기부대양여 방식에 의한 국방부 이전협의 승인 -- 2002.08.16

○ 제5차 실무추진위원회 개최 ----------------- 2004.02.04

- 부지면적 및 이전규모 잠정 합의

○ 이전후보지 지자체 협의(전주시➩완주․임실군) -- 2004.03.23

○ 합의각서 조기체결 요청(전주시➩35사단) ---- 2004.10.21

- 106㎜직사공용화기사격장을 제외하고 합의각서 체결 요청

ꏅ 문제점

○ 직사공용화기 및 박격포사격장 확보 어려움으로 합의각서

체결이 안 되고 있음

○ 부대이전 시점에 맞춰 항공대 이전이 완료 되어야 기존부지 및

주변 시가화 예정용지 개발 가능

ꏅ 대 책

○ 타 지역 사례 등을 감안 직사공용화기 및 박격포사격장은

본 사업에서 제외하고 부대이전 사업 추진토록 적극 협의

○ 항공대는 국방부 자체사업으로 이전토록 협의 추진

환 경 사 업 소

ꊱ	맑은하천 가꾸기적극 추진 -----------------	71
ꊲ	위생처리능력 배가 증진 -------------------	72
ꊳ	하수처리과정 시민공개 --------------------	73

맑은하천 가꾸기 적극추진

○ 차집관로의 철저한 관리로 전주천과 만경강등 수질보전

○ 신속하고 정확한 공정별 수질분석으로 하수처리효율 극대화

○ 지속적인 유입하수 및 방류수질 관리로 하천오염 방지도모

ꏅ 현 황

○ 차집관거 : 5개노선 44.77㎞(전주․삼․금암천. 아중․팔복선)

○ 시    설 : 맨홀 507개소, 우수토실 174개소, 환기구 53개소

○ 관리인원 : 5명 (기능1. 일용4)  차량1대 (봉고차)

○ 수 분 석 : 생활하수 등 21개 공정(BOD 등 14개 항목)

○ 슬러지분석 : 소화조 등 14개소(TS외 3개 항목)

○ 타공정 수질분석 : 공장폐수 등 21개소(BOD외 8개 항목)

ꏅ 추진실적

○ 차집관로 우수토실 개량공사

- 우수토실 10개소(D=300～800㎜ L=512m) : 143백만원

○ 상반기 차집관로 준설공사

- 팔복공단라인 외 3개소(L=1,507m Q=239㎥) :  30백만원

○ 하천방류수질 분석

(단위 : ㎎/ℓ)

구 분	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
수질기준	10	40	10	20	2	3,000개/㎖
처리실적	15.6	25.4	14.8	15.871	1.293	2,500

ꏅ 이후계획

○ 차집관로 지속적인 일일순찰 실시

○ 시간대 및 계절별 수질변화 지속관리

위생처리 능력 배가 증진

○ 일일 반입량 당일 24시간 운전으로 당일 소화처리

○ 철저한 예방점검으로 고장 없는 위생처리장 운영

ꏅ 현 황

○ 1일 처리 능력   ➪ 290㎘

○ 1일 평균 반입량 ➪ 400㎘

○ 수집 운반 차량  ➪ 15개사 45대(분뇨:4대  정화오니:41대)

ꏅ 추진실적

○ 일일 반입량 당일 소화로 처리효율 극대화

- 10월말현재 반입량 : 20,758대  116,772㎘(전년도 대비 94%)

- 1일평균 반입량 : 68대 383㎘(9.8시간 운전)

○ 집중 반입 대비 지하 저류조 최대 공간 확보

- 1일 최대반입량 : 984㎘(5월12일)

○ 연중 무휴 반입체제 실시

- 휴일반입 : 226대 1,363㎘

○ 자유시간대 반입(17:00～07:00)

- 조기반입 : 77일 134건

ꏅ 이후계획

○ 24시간 연속운전으로 처리능력 증진

○ 점검 정비 철저로 고장없는 위생처리장 운영

○ 연중무휴 반입체제 지속유지

하수처리과정 시민공개

○ 환경기초시설에 대한 지속적인 시민 홍보를 통한 환경보전

의식 함양

○ 합성세제, 생활오수 줄이기 및 하수처리의 중요성 제고

ꏅ 현 황

○ 1일 처리능력 : 303천㎥(1단계 103천㎥,  2단계 200천㎥)

○ 1일 처리량   : 291천㎥

ꏅ 추진실적

○ 하수처리과정 견학 : 2,808명

- 유치원 1,971명,  학생 462명,  기타 375명

○ 홍보관련 안내문 발송 : 1회(470개소)

- 사회단체            :  30개소

- 학교                :  73개소

- 유치원 및 어린이집  : 304개소

○ 최종방류수 수질검사 결과 매일공개 : 5개항목

ꏅ 이후계획

○ 하수처리과정 연중 시민공개

- 물의 중요성을 인식하고 환경보전의 생활화 유도

- 생생한 교육적 체험으로 수질오염을 사전 예방

- 주부 등 일반인 참여 적극유도

차량등록사업소 소관

ꊱ	시민이 만족하는 친절봉사 행정 구현 ------	75
ꊲ	자동차․건설기계등록원부 발급기관 확대 -	76
ꊳ	자동차 정기검사일 인터넷 조회 서비스 ----	77
ꊴ	건설기계 등록이전 처리기간 단축 ---------	78
ꊵ	자동차․건설기계 양도증명서 교부방법 개선 ---	79

시민이 만족하는 친절봉사 행정구현

친절봉사 생활화로 민원인 편의를 도모하고 민원행정의 투명성 및

신뢰성을 확보하여 시민이 만족하는 수요자 중심의 행정구현

ꏚ 개  요

○ 자동차 등록대수(2004.10월) : 194,703대.

○ 민원처리건수 : 846,226건(1일평균 3,400건)

ꏚ 추진실적

○ 민원 안내창구 개설운영

- 방문인원 : 700명/일

(신규/50, 이전/180, 변경/100, 말소/60, 저당/100, 기타/210)

- 민원안내 : 청경 및 자원봉사자 배치(1일2명/년560명)

․ 신청서 작성, 서류검토, 민원처리 등 종합적으로 안내

․ 장애인, 노약자 등 등록업무 대행(장애3급이하)

․ 분실물습득처리, 질서유지, 민원불편사항 수렴 등

○ DID전화 증설로 전화민원 불편해소(2004.3월 완료)

- DID전화 10회선 증설 : 7회선➪17회선

○ 자동차 등록원부 발급기관 확대(2004.01월부터)

- 민원행정시스템과 연계 시․구․동사무소에서 직접발급

○ 민원인을 위한 편의시설 설치

- 안내간판 설치

- 인터넷 PC

- 민원대기 순번기 추가설치

ꏚ 이후계획

○ 지속적인 창구직원 교육으로 친절한 대민서비스 추진

자동차․건설기계등록원부 발급기관 확대

자동차 및 건설기계 등록원부를 민원행정시스템과 연계

시․구․동사무소 에서도 확대 발급함으로서 기존 팩스민원

처리의 불편해소 및 민원 대기시간 단축

ꏚ 개  요

○  등록원부 발급기관 확대

- 2003년도까지 : 차량등록사업소에서 직접 발급하거나 구청․

동사무소에서 FAX민원으로 신청 발급

- 2004년부터 : 민원행정시스템과 연계 시․구․동사무소

에서도 확대 발급 시행

ꏚ 추진실적

○ 차량등록사업소 방문민원 및 다량신청민원은 종전대로 차량등록

사업소에서 발급

- 등록원부 발급현황(2004.10월) : 117,707건(1일평균 470건)

․ 자동차등록원부   : 113,900건

․ 건설기계등록원부 :   3,807건

○ 2004년부터 시․구․동사무소에서 등록원부 발급 시행(43개소)

- 자동차 등록원부   : 1,215건

- 건설기계 등록원부 :    43건

ꏚ 이후계획

○ 등록원부 발급기관 확대시행에 대한 대민홍보 적극추진

자동차 정기검사일 인터넷 조회 서비스

자동차 정기검사일을 시 홈페이지에서 등록번호 입력만으로

상시 확인 할 수 있게 하여 안방 민원 서비스 실현

ꏅ 현 황

○ 자동차 등록 대수 : 194,703대(2004.10월 현재)

○ 연간 검사 대상수 : 약 120,000대

※ 자동차 검사주기 : 6월～4년(차종 및 차령에 따라 다름)

ꏅ 그간 검사안내 개선 사항

○ 2002년 이전 : 경과안내 우편 1회 발송(법적사항)

○ 2003년 이후 : 경과안내 우편 2회로 늘려 발송

- 우편물 반송자 전화 안내 및 주민전산망 활용 현 거주지로 2차 안내

※ 검사 사전안내는 교통안전공단에서 1회 발송(만료 30일전)

ꏅ 추진실적

○ 자동차정기검사일 조회 인터넷 서비스 실시(2004.02.10일부터)

- 자동차 등록번호 입력으로 자동차검사일 검색

※ 검색방법 : 시 홈페이지 에서

자동차검사일 검색 (배너 클릭)	➪	자동차번호 (입력)	전북○가○○○○	➪	조회

○ 자동차정기검사일 인터텟 조회 서비스에 관한 홍보활동 강화

- 『더불어사는 전주』게재 홍보

○ 수범사례로 타시군에서 벤치마킹

- 남원시 외 6개시ㆍ군

건설기계 등록이전 처리기간 단축

타시ㆍ군에서 등록이전시 처리기간을 단축하여 이전에 따른

건설기계의 유휴일자를 줄여 시민 편익중심 행정 구현

ꏅ 등록이전 개요

○ 법적 처리기간		관 내 : 즉시
		관 외 : 20일

○ 관외 등록이전 평균소요 기간 : 15일

※ 처리계통도

	송부요청		원부송부
접 수	➪	타시ㆍ군	➪	등록완료
	5일		10일

ꏅ 추진실적

○ 목 표 : 평균 처리기간 15일 ➩ 10일로 단축

○ 실 적 : 평균 처리기간 9.3일(10일 이내처리 : 76%)

- 관외 등록이전 처리건수(2004.10월현재) : 673건

- 등록원부 등 관련서류 송부 요청시 스캐너를 이용 전자문서로

당일 송부 요청하여 처리기간 단축

- 전화 독촉 : 서울 영등포구청 외 230건

※ 전산으로 즉시 처리 가능토록 건설기계관리법개정 입법 예고중

자동차․건설기계 양도증명서 교부 방법 개선

등록이전시 2회 방문하여야 처리되는 제도를 양도증명서

교부방법 개선으로 1회방문 처리토록 대시민 서비스 강화

ꏅ 현  황

○ 자동차  이전등록대수(2004.10월) : 34,475대

○ 건설기계 이전등록대수(2004.10월) :    1,311대

ꏅ 추진실적

○ 자동차 양도증명서(서식) 교부장소 확대

- 차량등록사업소 1개소➩시․구․동 민원실 43개소로 확대

․ 시․구․동 민원실에 서식 배부 : 2회 8,600매

○ 인터넷(시청 홈페이지)을 활용한 서식 다운로드 방법 홍보

․ 시․구․동 민원실 43개소에 안내문 게시 협조의뢰

➲ 서식 다운로드 방법

- 시청 홈페이지 ➩ 차량등록사업소 ➩ 서식다운로드 ➩ 서식 출력(인쇄)

○ 건설기계 양도증명서(서식) 교부방법 개선

- 대여회사 47개소에 양도증명서 서식을 일정량(10매) 교부하고

이전 신청시 제출되는 양도증명서 매수만큼 추가 교부

※ 건설기계 양도증명서 교부시 소유자 인적사항 기재 후 교부

(건교부 지침)

ꏅ 이후계획

○ 인터넷(시청홈페이지)을 이용한 서식 다운로드 활용 홍보

○ 시․구․동 민원실에 정기적으로 서식 배부