제245회 전주시의회 제1차정례회

도  시  건  설  위  원  회

2007년도

주요업무 추진상황 보고

교   통   국

보   고   순   서

□	일 반 현 황		-------	1
□	부 서 별 주 요 기 능		-------	2
□	기 본 현 황		-------	3
□	주요업무 추진상황		-------
	○	교통행정과	-------	7
	○	교통시설과	-------	15
	○	도로과	-------	24
	○	재난안전관리과	-------	53
	○	하수관리과	-------	61
	○	차량등록사업소	-------	72

일  반  현  황

□ 기   구 : 5과 1사업소 22담당

																					교 통 국
	교통행정과 (4 담 당)							교통시설과 (3 담 당)								도 로 과 (4 담 당)											재난안전 관 리 과 (4 담 당)							하수관리과 (3 담 당)							차량등록 사 업 소 (4 담 당)
	교통행정							교통시설								도로행정											민 방 위							하수행정							등 록 1
	대중교통							경 전 철								도로시설											재난관리							하수시설							등 록 2
	교통지도							교통정보								도로정비
																											복구지원
																																		하수정비							보험지도
	주차장관리															도로경관											하천관리														건설기계

□ 정‧현원 현황(정원 100명, 현원 98명)

과 별		총 계	일 반 직						계약	기능
			4급	5급	6급	7급	8급	9급
계	정 원	100	1	6	22	27	22	4	1	17
	현 원	98	1	6	20	46	3	4	1	17
교통행정과	정 원	18	1	1	4	6	4	1		1
	현 원	18	1	1	4	11	0	0		1
교통시설과	정 원	16		1	3	4	2		1	5
	현 원	16		1	3	5	1		1	5
도 로 과	정 원	15		1	4	4	5	0		1
	현 원	14		1	3	8	0	1		1
재난안전관리과	정 원	14		1	4	5	3	0		1
	현 원	14		1	4	5	1	2		1
하수관리과	정 원	12		1	3	5	2	1
	현 원	12		1	3	7	1	0
차량등록사업소	정 원	25		1	4	3	6	2		9
	현 원	24		1	3	10	0	1		9

□ 부서별 주요기능

과 별	분 장 사 무
교통행정과	○ 교통종합계획 수립 ○ 대중교통(버스, 택시, 화물) 업무 추진 ○ 자동차운송사업체(버스, 택시, 화물 등) 지도감독 ○ 공영주차장 확충 및 관리, 교통영향평가업무
교통시설과	○ 도로교통 안전시설물 설치 및 유지관리 ○ 어린이 보호구역 정비사업 추진 ○ 경전철 사업 추진 ○ 전라선 복선화 사업 ○ 시내버스 정보화사업(BIS) 추진 및 운영관리 ○ 지능형 교통체계(ITS) 추진 및 운영관리
도 로 과	○ 도로부지관리, 도로안내표지판 설치관리 ○ 도로포장 보수지도, 자전거도로 시설, 가로등관리 ○ 신규도로개설 및 용지보상, 도시가로망 확충사업 ○ 가로환경 및 노점상 지도단속, 자전거이용 활성화
재난안전관리과	○ 민방위 계획수립 및 추진 ○ 재난방재 종합계획수립 및 시행, 재난재해대책추진 ○ 자연하천조성사업, 하천관리(국,공유재산 관리)
하수관리과	○ 하수도 공기업특별회계 운영 ○ 하수도 정비기본계획 수립 및 시행 ○ 하수관거 정비사업 추진 ○ 하수종말처리시설 운영관리
차량등록사업소	○ 자동차 등록(전산입력, 자료관리 및 증명발급 등) ○ 자동차 및 건설기계 과태료부과 ○ 건설기계등록(전산입력, 증명발급,검사최고, 정비명령 등) ○ 무보험차량조사(손해배상보장법위반 과태료, 범칙금부과 등)

□ 기본현황

○ 운수업체(2007. 6. 26일 현재)

(단위 : 개소/대)

구 분	계	버 스			택 시		화 물		렌트카	특수 여객
		시내	시외	관광	회 사	개 인	회 사	개 인
업 체 수	175	5	5	20	25		71		35	14
보유대수	10,129	398	477	389	1,599	2,284	1,835	1,693	1,420	34

○ 교통안전 시설물

(단위: 개소, 개)

교차로	신호등(개소)			제어기	보행자 음 향 신호기	보행자 잔 여 표시기	교 통 표지판	차 선	횡단 보도	횡단보도 조 명 등
	소계	LED	전구
431	431	247	184	381	64	447	8,808	849개노선 L=402㎞ 차선L=2,010km	1,707	102개소366등

○ 도    로

(단위 : 개소, ㎞)

구 분	계		고속국도		일반국도		지 방 도		시 도
	노선	연 장	노선	연 장	노선	연 장	노선	연 장	노선	연 장
총연장	850	407	1	5	5	62	3	22	841	318
포장도	850	407	1	5	5	62	3	22	841	318
포장율 (%)		100		100		100		100		100

※ 도로율 : 16.28%(도로면적/시가지면적)

○ 교량 및 기타 시설물

(단위 : 개)

구분 계	교 량					육교 보도	지하 보도	지하차도	터널	비 고
	소계	고속 국도	시의 국도	지방도	시도
122	103		34	3	66	6	6	5	2

※ 장대교량(삼례교 : 570m,  회포대교 : 707m)

○ 옥외광고물 현황

(단위 : 개)

광고업자 등록현황	시 지 정 광 고 시 설				비 고
	계	게시대	벽보판	기 타
430	515	150	365	-

○ 하    천

(단위 : ㎞)

구 분		개소	하천연장	제 방 연 장			개수율 (%)	비고
				계	기개수	미개수
계		24	100.5	177.7	141.3	36.4	79.5
법정하천	소 계	21	94.5	164.9	134.9	30.0	81.8
	국가하천	3	14.4	28.8	28.8	-	100.0
	지방 1급	2	19.8	39.6	38.6	1.0	97.5
	지방 2급	16	60.3	96.5	67.5	29.0	70.0
소 하 천		3	6.0	12.8	6.4	6.4	50.0

○ 하 수 도

구 분		처리구역 (㎢)	계획연장 (㎞)	시설연장 (㎞)	미시설연장 (㎞)	보급율 (%)	비고
계		69.9	2,141	1,331	810	62.2
합 류 식		18.9	661	661	0	100.0
분류식	소 계	51.0	1,480	670	810	45.3
	오수관거	-	856	372	484	43.5
	우수관거	-	625	298	327	47.7

○ 하수․위생처리 시설

구 분	하 수 처 리	위 생 처 리
위 치	덕진구 송천동 2가 1130번지
시설용량	1일 처리능력 ⇨ 403,000㎥ - 1단계 시설 : 103,000㎥ - 2단계 시설 : 200,000㎥ - 3단계 시설 : 100,000㎥	1일 처리능력 ⇨ 290㎘ - 분 뇨 : 30㎘ - 정 화 조 : 260㎘
처리방법	1․2단계 표준 활성 슬러지법 3단계 고도처리(CSBR) 공법	하수 연계처리 (1994년부터 시행)

○ 차집관로

하 천 명	연 장 (㎞)	맨 홀 (개)	우수토실 (개소)	환기구 (개소)	여수토실 (개소)
계 (6개노선)	71.8	1,010	251	73	5
전주천 (좌, 우안)	30.0	369	142	37	4
삼 천 (좌, 우안)	13.4	155	45	18
금암천 (좌, 우안)	2.9	82	38	9
아 중 선	11.4	174	16	4
팔복선(공장,생활)	10.8	183	8	5	1
상 관 라 인	3.3	47	2

○ 자동차등록(2007. 6. 25일 현재)

(단위 : 대)

합 계	승 용 차	승 합 차	화 물 차	특 수 차
211,985	160,727	12,459	38,455	344

교통행정과 소관

ꊱ	화산로 - 백제로 버스노선 확충 ---------	8
ꊲ	고객중심의 대중교통 체계 확립 ---------	9
ꊳ	불법 주․정차 단속 효율성 제고 ---------	10
ꊴ	한 쪽 면 주차하기 운동 추진 -----------	11
ꊵ	만남의 광장 조성 사업 -----------------	12
ꊶ	녹색 주차장 확장 사업 -----------------	13
ꊷ	시외버스 터미널 정비사업 --------------	14

화산로-백제로 버스노선 확충

○ 백제로와 화산로에 버스노선을 확충하여 팔달로와 연계된 내부

순환버스 체계를 확립하여 주민 생활편의 도모

□ 사업개요

○ 대상노선 : 화산로 ~ 백제로

○ 사업기간 : 2006. 12 ~ 2007. 12

○ 사업내용 : 도시 팽창과 시민 욕구에 맞춰 시내버스 노선체계 구축

□ 추진상황

○ 시행시기 : 2007. 4. 1.

○ 대상노선 : 순환노선(5-1번,5-2번)

○ 구    간 : 화산체육관~화산로~백제로~팔달로~장승로~화산체육관

○ 추진효과

- 화산로-백제로와 팔달로 장승로 연결노선

- 서신지구 대규모 신규아파트 수요 충족

- 고속․시외버스터미널 연결노선으로 각 권역별 이용 편의제공

- 시내 전지역 환승체계 구축으로 권역별 순환노선 연계 및 무료환승 용이

□ 문제점 및 대책

○ 신규노선의 경우 이용객 감소로 인한 적자 발생

➩ 추경예산 200백만원 확보 및 부족분 결산추경 확보

□ 금후계획

○ 순환노선 추가 대상지역 발굴 및 기존 순환노선 보완대책 마련

- 이용객이 많은 노선부터 추가 배치 검토

- 기존노선에 대한 이용객의 변화에 따른 노선 변경 강구

고객중심의 대중교통 체계 확립

○ 자가용 자동차의 증가로 교통정체가 지속되어 정시성 결여

등으로 수송효율 저하 및 원가상승에 따른 경영적자 누적

○ 대중교통 이용 우대정책 부족, 승용차 이용 증가 및 교통 혼잡

□ 사업개요

○ 시내버스 이용율 제고를 위한 기반 조성

- 대중교통 인프라 구축 ➩ 버스도착안내시스템(BIS) 확대 등

○ 고객 중심의 합리적 노선 조정 및 환승제 확대 : 2개노선 16대

○ 운수업체 재정지원(유가보조금, 재정지원금 등) : 39,501백만원

□ 추진상황

○ 버스정보시스템 구축

- 승강장 안내기 136개, 노변 기지국 233개, 차량내 안내기 94개

○ 노선별 연계 순환노선 확대 시행(5번,6번) : 2007. 4. 1.

- 무료환승객 이용실적(2007. 4월말 현재) : 3,174천명

※ 2,104,657명(2006.3.15~12.31), 1,069,741명(2007.1.1~4.30)

- 교통카드 이용율(5월말):13.2% 증가(시행전 40%➩시행후 53.2%)

○ 고객 중심의 노선조정으로 이용객 편의도모

- 모악산 등산객 및 우석대 학생을 위한 피크 타임제 시범도입

- 중복․굴곡노선 단순화 및 기종점 통폐합으로 일률적인 배차간격 유지(단독 노선화)

□ 금후계획

○ 2010년까지 교통카드 이용율 제고(이용율 70%까지 향상)

○ 버스정보시스템 확대

- 승강장 안내기 364개, 노변 기지국 267개, 차량내 안내기 316개

○ 대중교통계획․연차별시행계획 수립 및 제도개선(2007~2011)

○ 버스업체 경영진단 연구용역

- 경영분석 및 노선별 표준원가 산정, 적자노선 실차 조사

○ 운수업체 적기 지원으로 경영개선 및 친절서비스 향상

- 재정지원, 유류보조금, 대․폐차 지원, 벽지노선 손실보상 등

불법 주․정차 단속의 효율성 제고

○ 터미널‧시내버스 승강장 주변 및 주요 간선도로의 불법 주․정차로 인하여 시내버스 운행 및 교통체증 발생

○ 취약지역 시간대의 효율적인 불법 주․정차 단속을 실시하여 교통체증 해소

□ 운영현황

○ 단속구간 ---------------- 258개 구간 194.8km

- 금지구역 : 201개 구간 161km,  - 견인지역 : 72개 구간  68.7km

○ 단속인력 및 차량 : 47명(차량 16대)

○ 단속반 운영 : 17개반 47명

- 주간 13개반 39명, 야간 4개반 8명, 휴무 4개반 8명

○ 무인단속시스템 운영 ------ 29개소(완산 18, 덕진 11)

□ 추진상황

○ 무인단속시스템 확대 설치 --------------- 20개소

- 주요간선도로, 대형유통시설․예식장, 민원다발지역

○ PDA를 활용한 단속시스템 운영 --------- 28대

○ 교통 서포터스 운영 --------------------- 24개 구간 100명

- 운영실적 : 27,026건(계도, 이동조치, 안내)

○ 교통사고 줄이기 캠페인 추진 ------------ 2007. 5~6

- 참여실적 : 2,332명(공무원 및 경찰, 단체, 봉사대 등)

□ 금후계획

○ 무인단속 시스템 20대 추가 설치 --------- 720백만원

○ 차량 탑재형 불법 주․정차 이동식 단속시스템 도입(2대 60백만원)

○ 교통서포터스 운영 ----------------------- 2007. 4~7

○ 교통사고 줄이기 캠페인 추진(매월 격주 금요일) - 2007. 9~11

○ 지역실정에 맞는 불법 주․정차 단속의 탄력적 운영 - 연중

○ 터미널, 시내버스 승강장 주변 불법 주․정차 근절 -- 연중

한 쪽 면 주차하기 운동 추진

○ 차량의 급증에 따른 주차시설 부족으로 주택가 이면도로의 양방향      불법 주정차로인한 주민통행불편과 교통사고위험이 존재하고

○ 소방차 구급차 등 긴급차량의 통행에 막대한 지장을 주고 있어

주민참여에 의한 한쪽면 주차하기 운동을 전개하고자 함

□ 사업개요

○ 운영지역 : 시범지역 6개소(구청별 3개소)

○ 운영방법 : 자율지역과 강제지역으로 구분 운영

- 자율지역 : 중앙 황색 실선

- 강제지역 : 한쪽차선은 백색차선, 반대쪽 차선은 황색점선

○ 운영주체 : 각 동 주민자치위원회

○ 사 업 비 : 70백만원

□ 추진상황

○ 자율지역 : 완산구(삼천남초1길), 덕진구(북부시장1길)

○ 강제지역 : 완산구(서신남5길)  , 덕진구(진버들1길)

□ 금후계획

○ 관련부서 협의 --------------------- 2007. 7월

○ 관련기관 간담회 개최 -------------- 2007. 8월

- 참석대상 : 구청, 경찰서, 소방서, 주민자치위원회

- 협의내용 : 한 쪽 면 주차하기 구간 설정

○ 추진방법

- 자율적인 방법 : 주민자치위원회 주관

- 강제적인 방법 : 경찰협의 후 추진

○ 자율지역 : 중앙 황색 실선

○ 강제지역 : 한쪽차선은 백색차선, 반대쪽 차선은 황색 점선

만남의 광장 조성 사업

○ 전주를 찾는 방문객에게 만남의 장소 및 휴식공간 제공

○ 전주에서 타지역으로 출퇴근하는 직장인에게 주차공간 제공 및

만남의 장소 마련

□ 사업개요

○ 위    치 : 5개소(동․서․남․북 방향)

- 남원․임실, 봉동․고산, 군산․익산, 정읍․고창, 무․진․장 방향

○ 사업기간 : 2006～2010년(5년)

○ 총사업비 : 6,000백만원(2006투자 - 368, 2007계획 - 1,128)

○ 사업내용 : 주차장, 휴게시설, 쉼터, 조경 등

□ 추진상황

○ 남원․임실, 봉동․고산 방향 조성 완료

- 남원․임실방향(2006년) : 색장동 부남마을(68면,2,596㎡)

- 봉동․고산방향(2007년) : 차량등록사업소 뒤(30면,1,097㎡)

○ 정읍․고창 방향 : 국립전주박물관 부근 부지 협의중

○ 무․진․장 방향 : 산정동 농협창고 부근 부지 협의중

□ 금후계획

○ 정읍․고창방향 부지선정 매입후 조성계획 수립 및 시행 - 2007.7～12

○ 무․진․장 방향 부지선정 및 조성계획 수립 -- 2007.8～12

○ 도시계획시설결정인가 등 관련절차 이행 ------ 2007.8～12

○ 년차별 계획에 의거 조성 사업 추진 ---------- 2007～2010

녹색 주차장 확장 사업

○ 도심 열섬 현상 해소 및 푸른 녹색 도시 건설

○ 주택가의 심각한 주차난 해소를 위하여 주택의 담장을 허물어

여유공간을 주차시설과 녹지공간으로 조성

□ 사업개요

○ 사업대상 : 녹색주차마을 시범지역 조성 2개소

○ 사업기간 : 2007년

○ 총사업비 : 1,000백만원

- 녹색 주차마을 시범지역 조성(2개소)

○ 사업내용

- 신설 공영주차장 : 친환경적인 포장자재 활용 및 조경 식재

- 녹색 주차마을 조성 : 담장 허물기 후 주차장 조성 및 조경

□ 추진상황

○ 녹색주차장 조성 ------------------------ 2001 ～ 2006

- 모악산, 한옥마을(2), 삼천도서관, 가련산공원, 만남의광장(2)

○ 녹색주차마을 시범지역 조성 사업 추진 ----- 2007. 5 ~ 11

- 조성지역 : 덕진구 인후2동 지역

- 사업규모 : 대상주택 21동, 가로조성 633m, CCTV 5개소

- 사 업 비 : 465백만원

- 공사착공 : 2007. 5. 11

□ 금후계획

○ 녹색주차마을 시범지역 공사 준공 ----------- 2007. 11

※ 시범지역 1개소 조성후 주민 활용도 및 반응 등 감안 확대 추진

○ 녹색주차장 조성 사업 추진

- 신설 공영주차장 친환경적 포장 및 조경 식재

시외버스 터미널 정비사업

○ 1970년대 건축된 노후 시설물로서 이용객들에게 많은 불편을 초래하고 있어 현대화 시설로 정비 이용객들에게 편익 제공

○ 전주의 관문으로서 전주를 찾는 외지인들에게 오래도록 기억에 남는 깨끗한 도시로서의 이미지 제고

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 시외버스터미널 정비사업

○ 사 업 량 : 대합실 시설개조 외 5개 분야

○ 사 업 비 : 1,000백만원

○ 사업기간 : 2007. 7 ~ 9(3개월)

□ 추진상황

○ 정비사업 계획수립 --------------------- 2007. 2. 7

○ 건축설계업체 선정 : (유)건축사무소 메가피아

- 기본설계 : 2007. 3 ~ 4월

- 실시설계 : 2007. 5 ~ 6월

○ 건축설계 허가신청 협의(덕진구 건축과) -- 2007. 6. 19

- 임대차 토지소유자 사용승낙서 징구 완료(21명) -- 2007. 6. 28

○ 정비사업 건축허가 신청(덕진구청) ------- 2007. 6. 29

- 시, 전북고속, 건축사 착공 등 업무협의 -- 2007. 6. 29

(지방자치단체를 당사자로 하는 계약법 준용 - 일반경쟁입찰 등)

○ 임시매표소(구 한진고속 매표소) 설치 --- 2007. 6. 29~7. 3

□ 금후계획

○ 입찰공고(전북고속) --------------------- 2007. 7. 2

○ 공 사 착 공 ---------------------------- 2007. 7월중

○ 공 사 준 공 ---------------------------- 2007. 9월중

교통시설과 소관

ꊱ	어린이 보호구역 개선사업 --------------	16
ꊲ	사고잦은지점 교차로 개선사업 ----------	17
ꊳ	LED 신호등 교체 설치 사업 -----------	18
ꊴ	차선 도색(재도색) 사업 ----------------	19
ꊵ	교통안전시설 확충 및 정비사업 ---------	20
ꊶ	신호등 설치․이설 집약화 사업 ---------	21
ꊷ	교통사고 줄이기 본부 설치운영 ---------	22
ꊸ	교통 정보․신호 시스템 효율적 운영관리 -	23

어린이 보호구역 개선사업

○ 교통약자인 어린이를 안전사고로부터 보호하기 위한 통학로

교통안전시설 확충 및 정비

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2003 ~ 2007(1단계 사업)

○ 총사업량 : 중앙초교 외 58개교

○ 총사업비 : 9,645백만원(국비 50%, 시비 50%)

○ 2007년 사업량 : 16개교  3,092백만원

- 2006 이월예산 : 2,086백만원(국 579, 시 1,507)

- 2007년 본예산 :   756백만원(국 378, 시   378)

- 2007 추경예산 :   250백만원(도  50, 시   200)

○ 2006년까지 추진실적 : 43개교(6,553백만원)

구 분	계	2003	2004	2005	2006
사 업 량 (개소)	43	6	9	15	13
사 업 비 (백만원)	6,553	1,461	1,020	2,200	1,872

□ 추진상황

○ 사고이월 공사분 2개학교(남초교,신동초교) 준공 - 2007. 5

○ 2007년 1차분 9개교 공청회 및 공사추진 ---- 2007. 1~8

□ 문제점 및 대책

○ 학교 주변상가 반대로 공사지연 및 공사중 잦은 설계변경 발생

➩ 어린이의 안전한 통행권 확보차원의 사업임을 이해․설득

○ 주변 여건변화로 초등학교 주변 스쿨죤 요구 민원 많음.

□ 금후계획

○ 2007년 2차분 5개교 공청회 개최 및 공사추진 -- 2007. 7~10

○ 기 시행한 1단계 어린이보호구역 점검 보완 추진 -- 2007. 7~11

사고잦은지점 교차로 개선사업

○ 년간 중대형 교통사고 5건 이상 발생장소 사고원인을 분석,

사고 재발생 방지를 위한 개선 사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 사고잦은지점 2개소(색장동 커브길 및 완산동 용머리길)

○ 사업내용 : 차량감속 유도시설 및 안전시설 보강, 개선

○ 사 업 비 : 110백만원(국비 50%, 시비 50%)

□ 추진상황

○ 개선을 위한 전문가 노상간담회 및 관련기관 자문 --- 2007.1.30

○ 사고 재발방지를 위한 우선조치(색장커브) ----- 2007.1.31

(경광등, 갈매기 표지판, 델리네이터 등)

□ 문제점 및 대책

○ 매년 경찰청 및 도로교통 안전관리공단에서 사고잦은지점을 지정하여 안전시설 확충을 요구하고 있으나 예산부족으로 완벽한 시설 보강 미흡

➩ 예산의 범위내에서 안전시설을 도입 설치하고, 교통문화 의식 개선을 위한 홍보,교육,캠페인 등 교통사고 줄이기 운동 전개

□ 금후계획

○ 용머리길 사고잦은지점 개선사업 설계발주 --- 2007. 7

○ 공 사 추 진 ------------------------------- 2007. 7~9

LED 신호등 교체 설치 사업

○ 전력소비 및 고장이 많은 전구식 신호등을 LED 신호등으로 교체

- 고장발생 70% 감소로 유지보수비 절감 및 전력료 85% 감소

- 태양빛에 의한 난반사 현상 해소 및 양호한 시인 - 사고25%감소

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2002 ~

○ 교체대상 : 352개소 4,165등

○ 사 업 비 : 8,000백만원(국비 6,198, 시비 1,802)

○ 2006년까지 추진상황

- 사 업 량 : 168개소 완료(48%)

- 사 업 비 : 1,463백만원

○ 2007년 계획

- 사 업 량 : 23개소

- 사 업 비 : 343백만원(국비 240, 시비 103)

□ 추진상황

○ 우선사업 대상지 경찰과 합동조사 선정 완료 - 2007. 4

○ 설 계 완 료 ------------------------------- 2007. 5

□ 문제점 및 대책

○ 국비보조사업으로 국비 확정 내시가 늦어져 발주 지연

➩ 7월 국비 확정내시 예정으로 발주 추진

□ 금후계획

○ 공 사 발 주 ------------------------------- 2007. 7

○ 공 사 추 진 ------------------------------- 2007. 7~11

차선 도색(재도색) 사업

○ 차선 재도색 시기 기준에 의한 사후 유지관리 철저로 교통

사고 방지 및 도로 미관 향상

□ 사업개요

○ 차선현황 : 849개 노선, 차선길이 2,010km, 횡단보도 1,707개

○ 사업내용 : 18개 노선, 차선길이 400km, 횡단보도 500개

○ 사 업 비 : 1,425백만원(도색 1,300, 지우기 125)

□ 추진상황(현공정 60%)

○ 전주마라톤코스 외 주요 간선도로 및 중로 차선퇴색 구간 도색

- 10개 노선 220km(780백만원) 완료

□ 문제점 및 대책

○ 차선 평균수명은 주요간선도로 및 교차로는 1년, 기타 도로는 2년 이하인데 예산부족으로 주요도로 3년, 이면도로 6년 주기로 재도색

※ 국도유지관리사무소의 경우 1년 1회 재도색

➩ 연차적으로 사업비를 증액 확보 누적된 재도색 주기 단축

➩ 신규 및 재포장 도로는 차선 수명이 긴 2액형으로 도색하도록 지침 수립

□ 금후계획

○ 공 사 추 진 ------------------------------- 2007. 7~12

- 간선도로 및 이면도로 8개 노선 180km (645백만원)

※ 민원요구 장소 외 조사된 장소 중 우선순위에 의한 도색 추진

교통안전시설 확충 및 정비사업

○ 주의․지시․규제․보조 등 교통표지판 및 반사경․규제봉․

갈매기․표지병․안전휀스 등 시선유도 교통안전시설 확충 및

정비로 교통사고 예방

□ 사업개요

○ 시설현황 : 표지판 8,808개, 시선유도시설 88,879개

안전휀스 등 안전시설 6,200m

○ 사업내용 : 표지판 설치 및 보수 200개

시선유도시설 설치 및 보수 2,000개

○ 사 업 비 : 400백만원

□ 추진상황

○ 단가계약 완료 ----------------------------- 2007. 3. 12

○ 전주마라톤코스 및 주요간선도로 일제 정비완료

- 교통표지판 230개소, 반사경 80개, 중앙분리 안전휀스 80m

규제봉 470개

□ 문제점 및 대책

○ 교통안전시설 관련 민원 년간 560건 접수 및 사업비 부족

(2006년 본예산 400백만원, 2007년 본예산 200백만원)

➩ 단가계약으로 여러 장소의 수시요구 민원 신속대처

➩ 부족예산 1회 추경 확보(200백만원)

□ 금후계획

○ 민원 지역 등 관할 경찰서와 협의 시행 ---- 2007. 7~12

신호등 설치․이설 집약화 사업

○ 안전사고가 많이 발생하는 교차로내 신호등 설치․이설 및

개선으로 사고를 감소시켜 시민의 인명과 재산보호

○ 교차로내 많은 시설물이 난립 설치되어 도시미관 저해 및

보행공간 불편을 해소하기 위하여 통합 설치

□ 사업개요

○ 시설현황 : 신호등 431개 교차로

○ 2006년까지 추진상황

- 사업내용 : 184개 교차로

- 사 업 비 : 2,650백만원

○ 2007년 계획

- 사업내용 : 16개 교차로(신호등 설치, 이설, 집약화, 횡단보도조명보수)

- 사 업 비 : 500백만원

□ 추진상황

○ 신호등 신설 : 2개소 완료(부영2차아파트3지, 서곡LG아파트3지)

○ 위치 이설 및 집약화 : 8개소 완료(백제로, 화산로)

□ 문제점 및 대책

○ 신호등 설치요구 민원은 많으나 경찰서 교통규제심의위원회에 상정 결과에 따라 우리시가 설치함으로 모든 민원 수용 불가

➩ 단가 계약으로 신호등 설치기준에 의한 민원사항은 신속 처리

➩ 신호등 신설 및 이설시 집약화 병행 추진 - 예산절감(10백만원)

□ 금후계획

○ 공 사 추 진 ------------------------------ 2007. 7~11

※ 집약화 : 신호등 + 가로등 + 보행등 + 교통표지판 + 도로표지판 + 공공안내표지판

교통사고 줄이기 본부 설치운영

○ 사회적 공감대를 형성하여 시민이 동참하고 함께 만들어 가는

선진교통문화도시 조성

○ 교통사고 OECD선진국 수준으로 감소시키기 위한 여건마련

- 자동차 1만대당 사망자 목표 2.0인 이하(현 3.8인)

□ 사업개요

○ 구   성 : 15개 유관단체 (공동본부장: 전주시장외 6개 기관장)

○ 역   할

- 민․관․단체가 함께하는 선진교통문화 의식교육과 홍보, 캠페인 등 교통사고 줄이기 운동을 종합적으로 수행하는 구심체 역할

- 우리지역 교통사고 발생원인, 유형, 특성 등을 분석 사고

예방법 홍보, 재 발생 방지, 캠페인 등을 종합적으로 수행

- 사고 예견지역의 신고접수 및 우수사례(제안) 공모 시책반영

- 교통약자에 대한 안전교육 프로그램 도입 운영

․어린이 안전교육 : 정보센터 교육장 활용 및 초등학교, 유치원 찾아가는 교육

․노인 안전교육 : 동 자치센터 및 노인정 활용

․어르신 안전지도자 양성 : 소정의 교육 이수 후 지역 교통사고 예방활동 활용

○ 소요사업비 : 140백만원

□ 추진상황

○ 유관단체 실무자 간담회, 준비 실무 협의회(3회) -- 2007. 1~3

○ 교통사고 줄이기 본부 창립대회 개최 ------- 2007. 4. 12

○ 추진위원회 개최 및 사고 대책회의 등 유관기관 회의 6회 시행 조치

○ 찾아가는 교통안전교육 등 시행 : 75개소 77회 8,920명

○ 어린이 교통안전 뮤지컬 유치 공연 : 5. 8~5. 9(2일간) 1,680명 관람

□ 금후계획

○ 어르신 안전지도자 양성교육 및 안전지도 위탁운영, 어린이 교통체험교육 위탁운영, 찾아가는 교육 지속 ------- 2007. 6~12

교통 정보 ․ 신호 시스템 효율적 운영관리

○ 교통정보․신호 시설물의 증가 및 장비 노후화로 장애 발생

➩ 전문업체 용역 관리

○ 신속․정확한 교통상황 정보제공 및 효율적 운영으로 시민편익 증진

□ 사업개요

○ 사 업 비 : 600백만원

○ 사업내용

- 교통신호시설물 및 BIS시스템 유지관리 용역

․신호 : 주전산장치, 교통상황판, 신호제어기 381대, CCTV 39개소

․BIS : 승강장안내기 136개소, 노변기지국 233개소

- 교통신호 DB구축 및 운영관리 용역

․내용 : 교통량 조사, 현시방법 및 현시값 조정, 주기조정, 연동값 조정

□ 추진상황

○ 교통신호시설물 및 BIS시스템 유지관리 용역 - 2007.3~2008.2

- 용역업체 : 지에스 네오텍

○ 교통신호 DB구축 및 운영관리 용역 ----- 2007.6~2008.4

- 용역업체 : 도로교통안전관리공단

□ 문제점 및 대책

○ 교통시설물의 첨단장비 증가 및 기존 시설물 노후화

○ 교통정보․신호 시설물 유지관리 전문인력 부족으로 장애 발생시 즉시 조치 불가 - 시민불편 초래

➩ 전문업체(기관)에 유지관리 용역(관리업체 24시간 대기)

□ 금후계획

○ 교통신호 및 BIS시스템 최적의 운영 유지관리

도 로 과  소 관

ꊱ	남부순환도로 개설 -------------------	25
ꊲ	전주 진입로 확장 ----------------------	26
ꊳ	원대한방병원~가련교간 도로개설 -------	27
ꊴ	동산고가교 접속도로 확장 -------------	28
ꊵ	대학로 개설 관련 전북대 시설지원사업 ---	29
ꊶ	세내길(우림교~포스코) 개설 -----------	30
ꊷ	전통문화가 어우러진 남천교 가설 --------	31
ꊸ	한옥마을 테마관광로(은행로) 조성 ------	32
ꊹ	법원~동아한일APT간 도로개설 ---------	33
	남도주유소~고속터미널간 도로확장 ------	34
	우전로(서곡광장~서부신시가지) 확장 ----	35
	안행교~효자광장간 도로 확장 ----------	36
	서남권 국도대체 우회도로 건설 ---------	37
	북부권 국도대체 우회도로 건설 ---------	38
	전주~논산간 고속도로 확장 ------------	39
	전주~광양간 고속도로 건설 ------------	40
	익산~전주~장수간 고속도로 건설 -------	41
	우림교~안행교 사거리 도로확장 --------	42
	도로안내 표지판 정비 ------------------	43
	관내 외곽지역 가로등 신설 -------------	44
	주요도로 가로등 조도개선 --------------	45
	아름다운 간판디자인 및 시스템 개발용역 -	46
	지하차도 및 터널 조도개선사업 ---------	47
	전주천 교량 야간경관 조명 설치 ---------	48
	중앙 분리대 설치 ----------------------	49
	아름다운 교량 및 터널 만들기 용역 ------	50
	소송 패소 토지 및 미불용지 매입 --------	51
	자전거 보관대 설치 및 정비 ------------	52

남부순환도로 개설

○ 서남권 지역의 교통량을 외곽으로 분산시켜 도심교통난 해소

○ 외곽 도로망 구축으로 주변의 발전 기틀 및 교통편익 제공

□ 사업개요

○ 구    간 : 서서학동 공수교～동서학동 좁은목

○ 사 업 량 : 연장 1,560m, 폭 25～35m

○ 사 업 비 : 36,800백만원(보상 21,600, 공사 15,200)

○ 사업기간 : 1998 ～ 2010(13년)

□ 추진상황(전체공정 58%)

○ 공수교～거산황궁ⓐ～무궁화주유소간 공사완료 - 1998. 1～2005. 9

○ 장승로~공수교(150m)간 부분개통 --- 2005.10～2006. 5

○ 전일연립~산성천간 토지 및 지장물보상 - 2007. 2～ 현재

- 전일연립 33세대중/23세대, 토지 46필지중/26필지 협의 완료

○ 전일연립 미협의 10세대 수용재결신청 - 2007. 5. 11

※ 투자액 : 24,057백만원(기투자 18,557, 2007년 5,500)

□ 문제점 및 대책

○ 산성천~좁은목(420m)구간의 건물노후로 붕괴 위험이 있어

조기 보상 및 잔여구간 도로 조기개설 요구

➩ 주민 안전사고를 해소코자 잔여 사업비(12,743백만원) 조기 확보

□ 금후계획

○ 전일연립주택~산성천간 보상마무리 ---- 2007. 7~2007.10

○ 전일연립 2동 철거 및 교대뒤 공사추진 - 2007. 7~2007.10

○ 잔여구간 보상 및 공사추진 ------------ 2008. 1~2010.12

전주 진입로 확장

○ 우리시 관문인 전주진입로 정비로 쾌적한 도시환경 제공

○ 도로 미확장구간 확장으로 병목해소 및 교통편익증진 도모

□ 사업개요

○ 구    간 : 덕진동 원대한방병원～팔복동 BYC

○ 사 업 량 : 연장 1,320m, 폭 35➩50m

○ 사 업 비 : 17,000백만원(보상 10,000. 공사 7,000)

○ 사업기간 : 1999 ～ 2008(10년)

□ 추진상황(전체공정 82%)

○ 원대한방병원～추천대교간 확장완료(710m) - 1999. 1～2003.12

○ 추천대교～BYC측(610m) 확장완료 ------ 2004. 3~2006.12

○ 추천대교~전북은행측(610m) 보상추진 - 2007. 2～ 현재

- 토지 14필지중/4필지, 지장물 32건중/20건 협의 완료

※ 투자액 : 14,486백만원(기투자 11,986,  2007년 2,500)

□ 문제점 및 대책

○ 추천대교～전북은행측 도로 미확장으로 병목현상 초래는 물론  및 사업 장기화로 지역주민 불만 팽배

➩ 병목현상 해소를 위하여 잔여사업비(2,514백만원) 조기 확보

□ 금후계획

○ 추천대교~전북은행측(610m)보상 완료 --- 2007. 7~10

○ 지장물 철거 및 지하매설물 설치 ---------- 2007. 8~12

○ 추천대교~전북은행측간 도로확장 완료 ---- 2008. 1~12

원대한방병원~가련교간 도로개설

○ 하가택지개발사업 시행으로 인근의 도로개설 절대 필요

○ 송천동과 서부지역을 연결하는 도로개설로 시내교통난 해소

□ 사업개요

○ 구    간 : 덕진동 도립국악원 ～ 덕진동 가련교간

○ 사 업 량 : 연장 1,400m, 폭 35m

○ 사 업 비 : 27,000백만원(보상 10,000, 공사 17,000)

○ 사업기간 : 2005 ～ 2008(4년)

□ 추진상황(전체공정 22%)

○ 실시설계 및 도시계획 변경결정(광장축소) --- 2003.11～2005. 8

○ 1차공사 시행(택지개발구간 L=300m) --- 2006. 5～2006.12

○ 도립국악원~하가택지경계간 보상추진 -- 2007. 3～ 현재

- 토지 150필지중/98필지, 85건중/62건 협의 완료

※ 투자액 : 19,560백만원(기투자 2,060,  2007년 17,500)

□ 문제점 및 대책

○ 대절토부 암 발파시 소음․진동으로 입원환자 피해 발생 우려

□ 병원 및 지역주민과 사전 협의 방호․방음벽 설치후 시행 민원 최소화

○ 일부주민 보상가 저렴 사유로 용지보상 협의 거부

□ 협의보상이 지연될 경우 토지수용 등 행정절차 이행

□ 금후계획

○ 도립국악원~하가택지경계 보상완료 --- 2007. 7~2007.10

○ 대절토부 암 절취 및 택지개발지구 성토 - 2007. 8~2007.12

○ 전 구간 도로개설 완료 및 개통 ------- 2008. 1~2008.12

동산고가교 접속도로 확장

○ 동산고가교 접속도로 진,출입부 미 확장으로 병목현상 초래

○ 도로확장으로 교통사고 위험 해소는 물론 차량소통 원활 기여

□ 사업개요

○ 구    간 : 동산동 동산고가교 ～ 동산역

○ 사 업 량 : 연장 340m, 폭 18.5➩35m

○ 사 업 비 : 2,990백만원(보상 1,700, 공사 1,290)

○ 사업기간 : 2003 ～ 2007(5년)

□ 추진상황(전체공정 95%)

○ 상행선 확장공사 완료 ------------------- 2005. 3～ 5

○ 하행선 부분확장 완료(340m중/100m완료) - 2006. 3～ 5

- 용수로 복개 L=20m, 상ㆍ하수도 L=538m ,인도 L=100m

○ 하행선 일부구간(70m) 암거 및 포장완료 - 2006.10～12

○ 편입토지 및 지장물 보상완료 ------------ 2007. 2 ~5

○ 하행선 차도포장 완료(240m) ------------- 2007. 2～ 6

※ 투자액 : 2,990백만원(기투자 1,590, 2007년 1,400)

□ 금후계획

○ 가로등 설치(5등) 및 공사마무리 --------- 2007. 7. 15

대학로 개설 관련 전북대 시설지원사업

○ 도시가로망 확충을 위한 대학로 개설내 국유지 대체시설지원

○ 국유지사용 대체시설 협약체결 사업으로 행정의 신뢰성 제고

□ 사업개요

○ 구    간 : 전북대학교내

○ 사 업 량 : 대운동장보수 1식, 학군단증축 106평,

동물병원후면 배수Box L=30m(3×2×2련)

○ 사 업 비 : 2,069백만원(21필지 31,470㎡)

○ 사업기간 : 2004～2007(4년)

□ 추진상황(전체공정 85%)

○ 대학로내 국유지사용 대체시설 협약체결 ----- 2003.12.22

- 지원사업 2006년까지 완료할 것임을 협약

○ 학군단 방음벽시설 완료 -------------------- 2004.12.20

○ 대운동장 보수공사 완료 -------------------- 2006. 2~6

○ 공사 일시중지(장마) ----------------------- 2007. 6.28

※ 투자액 : 2,069백만원(기투자 1,340, 2007년 729)

□ 금후계획

○ 잔여공사(배수BOX) 마무리 ---------------- 2007. 8월말

세내길(우림교~포스코) 개설

○ 대단위아파트 밀집지역의 진출입로 미개설로 교통체증 심각

- 아파트 1,527세대가 2005년 9월부터 입주 시작

○ 서부신시가지와 연계되는 주요 노선으로 도로개설이 시급함

□ 사업개요

○ 구    간 : 효자동 우림교～포스코 APT 앞

○ 사 업 량 : 연장 350m, 폭 25m

○ 사 업 비 : 5.300백만원(보상 2,200, 공사 3,100)

○ 사업기간 : 2006 ～ 2008(3년)

□ 추진상황(전체공정 24%)

○ 이동교~포스코@(L=700m) 개설 ---- 2004.12～2007.5

○ 분할측량 및 실시설계용역 추진 ------- 2006. 2～2007.2

○ 보상협의 추진(8필지) ---------------- 2006. 3～2007.5

○ 도시계획사업 실시계획인가 완료 ------- 2007. 6. 21

※ 투자액 : 2,100백만원(기투자 500, 2007년 1,600)

□ 문제점 및 대책

○ 아파트 밀집지역으로 주 간선도로가 미개설로 교통정체 등 주민 불편 심화

□ 주민불편이 해소될 수 있도록 부족사업비(3,200백만원) 조기확보

□ 금후계획

○ 총괄발주 및 1차사업 추진 ------------ 2007. 7~2007. 12

○ 잔여구간 보상 및 사업추진 완료 ------ 2008. 1~2008.12

전통문화가 어우러진 남천교 가설

○ 한옥마을ㆍ한벽루 등 자연형 하천과 어우러진 특색있는 교량  가설로 가장 한국적인 전통문화도시의 이미지 부각

○ 통과ㆍ연결기능에서 쉬어가는 휴식공간을 확보 주변 환경과  조화를 이루도록 하여 천년전주 상징화

○ 무형문화유산전당 건립 조건이행(문화재청)

□ 사업개요

○ 구    간 : 은행로~전주천좌안도로, 전통문화센터~무형문화의전당

○ 사 업 량 : 남천교(L=80m,B=16m), 인도교(L=150m,B=6.9m)

○ 사 업 비 : 14,000백만원(공사)

○ 사업기간 : 2006 ~ 2009(4년)

□ 추진상황(전체공정 10%)

○ 한옥보존위원회및 설계자문위원회 자문 - 2004. 1~2004.9

○ 선진도시견학 및 특색있는 교량검토 ---- 2006. 1~2006.9

○ 시의회 도시건설위원회 간담회 -------- 2006.12.21

○ 기본 및 실시설계용역 착수 --------------- 2007.4.13~12.18

※ 투자액 : 5,050백만원(기투자 500,  2007년 4,550)

□ 문제점 및 대책

○ 옛 교량 역사 고증자료 미흡으로 정통성 확보에 어려움

➩ 풍속, 고고학 전문가, 역사박물관 자료를 실시설계시 충분히 반영

□ 금후계획

○ 경관심의위원회 위촉(12인 이내) --------- 2007. 6월말

- 고건축․조경 전문가, 향토사학자, 지역주민 대표 등

○ 경관 및 교량형식 결정 ------------------- 2007. 7월말

○ 관계기관 협의 및 인․허가(문화재 등) ------- 2007. 8.

○ 설계자문위원회 자문 및 공사발주 --------- 2007.11~12

한옥마을 테마관광로(은행로) 조성

○ 한옥마을을 찾는 국내외 관광객들의 안전한 보행권 확보

○ 가장 한국적인 전통문화 이미지를 반영 관광명소로 부각

□ 사업개요

○ 구    간 : 교동 남천교～동부시장

○ 사 업 량 : 연장 980m, 폭 8➩12m

○ 사 업 비 : 9,500백만원(보상 4,500, 공사 5,000)

○ 사업기간 : 2005 ～ 2007(3년)

□ 추진상황(전체공정 40%)

○ 도시계획변경결정(폭15➩12m) ---------- 2005. 8.26

○ 착공 및 이주건물철거 완료(30동) --------- 2006.4～2007.5

○ 지하수개발(2공-각각 200톤/일)․수질검사결과 적합 -- 2007. 4. 3

○ 한전 지중화공사 협약체결 -------------- 2007. 4.11

○ 의회간담회, 정책조정회의, 주민설명회 --- 2007.4.12~5.8

※ 확보액 : 9,500백만원(보상 4,500, 공사 5,000)

□ 문제점 및 대책

○ 각종 지하매설물 일괄추진을 위한 공사구간 통행제한으로 지역주민 및 통행차량 등의 불편민원 발생 예상

⇨ 7개구간으로 나누어 시행하고, 구간별 우회노선 안내판 설치 및

안전요원 배치 등으로 지역주민 및 통행차량 불편 최소화 도모

(2007.9월 추석이전 완료)

□ 금후계획

○ 바닥콘크리트 타설 및 돌포장 ------- 2007. 7.∼2008. 5.

○ 실개천 및 쌈지공원 조성 ----------- 2007.10.~2008. 3.

○ 도로확장 완료 및 개통 ------------- 2008. 6. 30

법원~동아한일APT간 도로개설

○ 구도심과 신시가지 연결교량 가설로 지역경제 활성화

○ 덕진․서신동 일대 도심교통난 해소 및 낙후지역 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 구    간 : 덕진동 법원～서신동 동아한일APT

○ 사 업 량 : 연장 248m, 폭 25m(교량 118m, 도로 130m)

○ 사 업 비 : 11,700백만원(보상 3,000, 교량 및 도로공사 8,700)

○ 사업기간 : 2004 ～ 2007(4년)

□ 추진상황(전체공정 100%)

○ 롯데백화점 입점에 따른 도로개설 협약체결 - 2004. 5. 14

○ 법원로 공사 착공  ------------------- 2005. 3. 3

○ 서신동 동아@~사평교간 완료 -------- 2005. 3～2006. 4

○ 미협의자(4세대) 토지수용 재결신청 --- 2006. 9. 4

○ 전북지방토지수용위원회 재결 --------- 2007. 1. 25

○ 행정대집행 실시(4동) ---------------- 2007. 2. 8

○ 사업 마무리 및 개통 ----------------- 2007. 4. 30

※ 교통시스템(신호주기) 조정 ---------- 2007. 5. 1~5. 25

남도주유소~고속터미널간 도로확장

○ 도로확장 및 보도설치로 보행자와 고속터미널 이용객

들의 편익증진 도모

○ 노후건물 재건축등으로 도시미관 제고 및 침체지역 활성화

□ 사업개요

○ 구    간 : 금암동 남도주유소～고속터미널간

○ 사 업 량 : 연장 500m, 폭 20 ⇒ 23m

○ 사 업 비 : 3,200백만원(보상 1,700, 공사 1,500)

○ 사업기간 : 2004 ～ 2008(5년)

□ 추진상황(전체공정 6%)

○ 도시계획도로폭 축소(25⇒23m)결정 -- 2005. 6

○ 실시설계용역 완료 ------------------- 2005. 9~2006. 2

○ 보상추진(6필지/128㎡) --------------- 2005.12~2006. 1

○ 사업비 5억원 확보(추경)

□ 금후계획

○ 용지매입 추진 ------------------------ 2007. 7~12

○ 용지매입 및 도로확장 완료 ------------ 2008. 1~12

우전로(서곡광장~서부신시가지) 확장

○ 신시가지 지구내 도로준공에 따른 연계도로 확장시급

○ 도로확장으로 보행권 확보등 안전사고 및 교통체증 해소

□ 사업개요

○ 구    간 : 효자동 서곡광장～서부신시가지 경계

○ 사 업 량 : 연장 1,200m, 폭 20 ⇒ 35m

○ 사 업 비 : 4,500백만원(보상 2,000, 공사 2,500)

○ 사업기간 : 2007 ～ 2009(3년)

□ 추진상황

○ 서곡지구 택지개발시 부분개설(폭 20m) ------- 1997년도

○ 사업비 확보(추경) 300백만원(실시설계 150, 가각정리 150)

□ 금후계획

○ 실시설계용역 추진 ------------------------ 2007. 7~12

○ 서곡광장 가각정리 및 변속차로 시설 ------- 2007.10~12

○ 편입토지 및 지장물 보상 ------------------ 2008. 1~12

○ 도로확장 완료 및 개통 -------------------- 2009. 1~12

안행교~효자광장간 도로 확장

○ 주공 4, 5단지 택지개발 및 대규모 공동주택 개발에

따라 장차 교통량 증가로 극심한 교통체증 예상

○ 택지개발 및 대규모 공동주택개발 완료전 도로를 확장하므

로써 교통체증 사전해소

□ 사업개요

○ 구    간 : 효자동 안행교사거리～효자동 효자광장

○ 사 업 량 : 연장 530m, 폭 25 ⇒ 35m

○ 사 업 비 : 9,000백만원(시비 4,800,  민간자본 4,200)

○ 사업기간 : 2007 ～ 2009(3년)

□ 추진상황

○ 효자4,5지구 택지개발 실시계획승인(주공) -- 2005. 6

※ 효자 4,5지구 택지개발사업 실시계획 협의조건에 따라 사용

검사일 이전까지 전주시에서 개설해야 됨(주택법 제23조)

- 사용검사 예정일 : 4지구 - 2007. 12월, 5지구 - 2010년

○ 우림교~안행교간(630m) 주공에서 공사시행중 - 2005.7~2007.11

○ 효자주상복합 신축 교평 심의의결 -------- 2007. 3. 30

- 사업대상지 전면 도로개설사업비(42억정도)만큼 효자광장 쪽으로

효자주상복합신축 사업자가(STS개발) 개설토록 결정

□ 금후계획

○ 실시설계용역 추진 ------------------------ 2007. 7~12

○ 편입토지 및 지장물 보상 ------------------ 2008. 1~12

○ 도로확장 완료 및 개통 -------------------- 2009. 1~12

서남권 국도대체 우회도로 건설

〈계속 ․ 국가사업〉

○ 시가지를 통과하는 국도1호, 17호, 27호선과 지방도 712호,

716호, 749호선의 교통량을 분산하여 시내권 교통정체 해소

○ 서남부지역 원활한 물동량 이동의 중심기능을 강화함으로써   지역개발 촉진 및 광역도시 발전기반 구축

□ 사업개요

○ 구    간 : 완주군 상관 ∼ 구이 ∼ 이서 ∼ 용정 ∼ 익산시 춘포

- 완공예정 : 구이∼용정(2008년), 용정∼춘포(2010년)

○ 사업규모 : 33.4km(폭 20m) ※ 전주시 구간 13.4㎞

○ 사 업 비 : 4,678억원(국비 4,368, 시비 310)

○ 사업기간 : 1998 ∼ 2010(13년)

○ 시 행 청 : 익산지방국토관리청(보상 : 전주시)

□ 추진상황(전체공정 83%)

○ 상관 ∼ 구이간(L=8.9㎞)개통 ----- 2005. 4. 20

○ 공사 및 보상 투자액 : 4,124억원(국비 3,849, 시비 275)

- 보상실적 ---------- 809필지 906,904㎡(88%)

- 미 보상 -----------  20필지  18,071㎡(994백만원)

○ 미 협의 용지 토지수용 재결신청 ----- 2007. 6. 29

○ 보상비 확보 ------------------------ 35억원(추경)

□ 금후계획

○ 용정～춘포구간 용지 보상 시행

- 보상대상 : 81필지 147,236㎡

○ 구이 ~ 춘포간(L=24.5km) 성토 및 공사

※ 구이～용정구간(17.5km) 준공 계획 : 2008. 12월 예정

북부권 국도대체 우회도로 건설

〈계속 ․ 국가사업〉

○ 시가지 통과 국도17, 27호선 교통량 분산으로 시내권 교통정체 해소

○ 북동부지역 원활한 물동량 이동의 중심기능을 강화함으로써   지역개발 촉진 및 광역도시 발전기반 구축

□ 사업개요

○ 사업구간 : 조촌 용정∼용진(구간축소)～아중역(1단계)～색장리(2단계)

※ 2 단계구간(아중역～색장) 전주~광양고속도로 교통수요 예측 후 개설

○ 사업기간 : 2006 ∼ 2013(9년)

○ 사업규모 : L= 11.2km, B= 20m(전주시 구간 : 8.4㎞)

○ 사 업 비 : 2,140억원(국비 1,970, 시비 170)

○ 시 행 청 : 익산지방국토관리청(보상 : 전주시)

□ 추진상황

○ 업체선정(대우 40%, SK 20%, 도내업체 40%) - 2006. 5. 30

○ 공사계약 및 교량 구조물 공사 착공 ------ 2006. 6. 28

○ 편입용지 분할측량 완료 ----------------- 977필지 634,707㎡

- 국유지(407필지, 168,896㎡), 사유지(570필지 465,811㎡)

○ 1단계(용정～아중역)에서 축소된 구간(용진～아중역) 연장건의

- 공문발송(2007.4.30), 건설교통부 관련부서 방문(3회)

□ 문제점 및 대책

○ 익산-신리간 복선전철 착수 전에 구증교(L=580m)가설이 완료       되어야 하는 실정임

- 구증교 가설 주변 보상비 확보 시급(약 10억원/16필지 28,155㎡)

□ 금후계획

○ 공사비 및 보상비 확보 -- 107억원(국비 105, 시비 2)

- 보상대상 -------------- 5필지 2,994㎡(소양천 주변)

전주∼논산간 고속도로 확장

〈계속 ․ 국가사업〉

○ 천안∼논산간 고속도로 개통에 따른 교통정체 해소

○ 논산∼전주간, 전주∼광양간, 익산∼장수간 고속도로 연결로 물류비용 절감

○ 행정수도 연계 교통망 구축으로 지역균형발전의 활성화 도모

□ 사업개요

○ 구    간 : 전주 ～ 삼례 ∼ 논산간

○ 사업규모 : 연장 17.0km, 폭 4차로➩6∼8차로

○ 사 업 비 : 3,500억원(국비)

- 삼례～논산 구간 사업비 : 2,143억원

○ 사업기간 : 2002 ∼ 2008(7년)

○ 시행기관 : 건설교통부(한국도로공사)

□ 추진상황 --------- 682억원(국비)

○ 공사발주 및 착공 -------------------- 2005.12.27

○ 삼례∼논산 구간 공정 : 19%

※ 전주∼삼례간은 현재 추진중인 익산∼장수간, 전주∼광양간

고속도로 개통 후 통행량 추이를 검토하여 시행여부 결정

- 사업 병행 시행 요구문서 발송(2007. 6. 29)

□ 금후계획

○ 편입용지 보상 및 공사 추진중

※ 준공예정 : 2010년(2005년 착공, 절대공기 부족으로 공기연장 불가피)

전주∼광양간 고속도로 건설

〈계속 ․ 국가사업〉

○ 군장산업단지와 광양만 산업단지의 연결도로망 구축 시급

○ 호남고속도로 및 익산∼장수간 고속도로의 연결로 고속도로

이용율 제고 및 산업 경쟁력 증진

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주 ∼ 남원 ∼ 광양간

○ 사업규모 : 연장 117.8km(전주시 구간 7.78㎞)

○ 사 업 비 : 28,231억원(국비)

○ 사업기간 : 2003 ∼ 2011(8년)

○ 시 행 청 : 건설교통부(한국도로공사)

□ 추진상황 --------- 7,650억원(국비)

○ 기본 및 실시설계․환경영향평가 등 행정절차 완료 - 2003. 12

○ 전주～남원구간(60.7㎞) 공정 : 35%(2004.12.30착공)

□ 문제점 및 대책

○ 우아동 삼거마을 주민민원 발생

- 진입로 고가교량에 대하여 조망이 확보되고 외관이 수려한

상징성 있는 장대교량 설치 요구

※ 전 주 시 : 도로공사 공문 발송(2006.12.7), 건교부 방문(2006.2.15)

도로공사 : 기획예산처 건의(2007.4월)

□ 금후계획

○ 편입용지 보상 및 도로 축조공사

※ 준공예정 : 2010년(1년 조기완공 : 광양만 배후 도로망 구축)

익산∼전주∼장수간 고속도로 건설

〈계속 ․ 국가사업〉

○ 군․장 산업단지 등 서해안 공업지대와 동․남해안 공업지대를

연결하는 도로망 구축으로 물류비용 절감

□ 사업개요

○ 위    치 : 익산 ∼ 전주 ∼ 장수간

○ 사업규모 : 연장 61km, 폭 4차로

○ 사 업 비 : 12,164억원(국비)

○ 사업기간 : 2001 ∼ 2008(8년)

○ 시 행 청 : 건설교통부(한국도로공사)

□ 추진상황 --------- 12,164억원(국비전액 확보)

○ 용지보상 완료

○ 도로축조 및 구조물 시공

○ 건축공사 등 기타공사 시행중

□ 금후계획

○ 편입용지 보상 및 도로 축조공사 추진

※ 준공예정 : 2007. 12월말(1년 조기 완공)

우림교~안행교 사거리 도로 확장

〈신규 ․ 국가사업〉

○ 도심을 통과하는 시관리 국도 1호선 확장으로 교통정체 해소

○ 서부지역 신흥 개발권과 구도심권의 연결 교통망 확장으로

지역간 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 위    치 : 우림교 ∼ 안행교 사거리

○ 사업규모 : 연장 0.63km, 폭 25m ➩ 35m

○ 사 업 비 : 70억원(국비)

○ 사업기간 : 2005 ∼ 2008(4년)

○ 시행기관 : 건설교통부(대한주택공사)

□ 추진상황 ---------- 70억원(국비 전액확보)

○ 실시설계 용역발주 ------------------ 2005.7∼2006.2

○ 편입용지 보상 ---------------------- 2006. 12

○ 공 사 착 공 ------------------------ 2007. 5

□ 금후계획

○ 준공 및 기부체납 ------------------- 2007. 11월중

도로 안내 표지판 정비

○ 전주를 찾는 방문객․통행인에게 쉽고 편리한 목적지 안내에

기여 및 아름다운 도시가로망 조성

□ 사업개요

○ 사업규모 :『도로표지규칙』에 의한 도로 표지판 정비(120개소)

- 공공시설 이전, 도로개설 등 변경사항 반영 및 민원 요구에 따른 정비

- 건교부 국도1호 도로안내표지판 5개년 정비계획에 의한 정비

○ 총사업비 : 120백만원

○ 사업기간 : 2007. 1 ∼ 2007. 12

□ 추진상황

○ 사업발주 ------------------------------  2007. 3. 23

○ 착    공 ------------------------------  2007. 4. 19

○ 추진실적(1차)

- 계   획 : 60개소 (수정 54, 판교체 3, 신설 2, 이설 1)

- 실   적 : 35개소 (수정 31, 판교체 3, 이설 1)

□ 금후계획

○ 1차 정비대상 완료(25개소) ------------ 2007. 7. 30

○ 2차 정비대상 조사 및 처리(60개소 정도) -- 2008. 1. 30

※ 신속한 민원처리를 위해 단가계약으로 추진

관내 외곽지역 가로등 신설

○ 관내 외곽지역 및 가로등 미설치 노선에 가로등 신설

○ 교통사고 예방 및 밝은 밤거리 조성으로 주민 불편해소

□ 사업개요

○ 위    치 : 상림선, 백석로, 장동로, 호성로, 전미선, 중인선

삼례로, 용진로, 남고로, 구이선 등

○ 사업내용 : 외곽지역 가로등(한전주 이용) 신설

○ 사 업 량 : 가로등 80개소 신설(L= 1,600m)

○ 사업기간 : 2007. 2 ～ 12(년중 시행)

○ 사 업 비 : 100백만원

□ 추진상황

○ 상림선, 백석로 가로등 51개소 설치 완료 ---- 2005. 10

○ 장동로, 호성로 가로등 77개소 설치 완료 ---- 2006. 11

○ 녹두길, 평화택지 가로등 18개소 설치 완료 ---- 2007. 4~5

□ 금후계획

○ 민원 발생지역인 삼천 세내교 하류에 기존 가로등을 이용하여   둔치방향에 가로등 설치 중점 추진(약 40개소 정도)

※ 신속한 민원처리를 위해 단가계약으로 추진

주요도로 가로등 조도개선

○ 팔달로, 충경로, 기린로등 구도심 주요도로 가로등의 조도를      개선하여 구도심 활성화 및 시민의 야간통행 불편해소

□ 사업개요

○ 위    치 : 충경로(다가교~동부시장)

○ 사업내용 : 기존 가로등을 철거하고 신규 설치

○ 사 업 량 : 가로등 60개소 교체(L= 1,800m)

○ 사업기간 : 2007. 6 ～ 11

○ 사 업 비 : 300백만원

□ 추진상황

○ 주요도로 가로등 야간조도 실태 조사 ------ 2006.  9~10

○ 가로등 조도개선 추진계획 수립 ----------- 2006. 11~12

○ 조도개선 사업구간 변경(팔달로→충경로) -- 2007.  3~5

※ 팔달로는 경전철 사업예정 구간으로 충경로로 변경

○ 하반기 도로굴착 유관기관 협의 ----------- 2007. 6

□ 금후계획

○ 도로굴착 심의 및 허가 ------------------- 2007. 7

○ 공사발주 및 입찰계약 -------------------- 2007. 8

○ 착공 및 완료 ---------------------------- 2007. 9~11

아름다운 간판디자인 및 시스템 개발용역

○ 도시미관을 전혀 고려하지 않고, 간판을 크고, 화려하게 난립으로 설치되고 있어 도시미관 및 경관에 저해됨

○ 따라서 우리시 특성에 맞는 옥외간판 표준디자인 및 시스템을 개발하고, 가이드라인을 정하여 간판이 아름다운 거리조성 기여

□ 용역개요

○ 대상간판 : 가로형 간판 등 옥외광고물

○ 용역내용

- 신규 택지개발지역의 간판 설치규격 및 수량 등 가이드라인 개발

- 우리시 특성에 맞은 간판의 글꼴,색채,형태 등 표준디자인 개발

○ 용 역 비 : 50백만원(추경)

○ 용역기간 : 2007. 7 ~ 11

□ 추진상황

○ 수도권 우수지자체 현지견학 --------------- 2006. 12. 6

○ 용역과제 심의완료 ------------------------ 2007. 5. 28

□ 금후계획

○ 용역착수 ---------------------------------- 2007.  7

○ 용역완료 ---------------------------------- 2007. 11

○ 아름다운 간판 시범거리 조성 사업비 신청(행자부) - 2007. 11

지하차도 및 터널 조도개선사업

○ 관내 지하차도 및 터널의 조명이 어둡다는 민원이 빈번하게 발생

○ 지하차도 및 터널 내부의 조도를 밝게 개선하여 운전자에게

밝고 안전한 차량운행

□ 사업개요

○ 위    치 : 남고과도교, 진북, 어은터널, 서신, 송천, 안덕원

월드컵로, 대학로 지하차도

○ 사업내용 : 조도불량 램프 및 노후선로 교체

○ 사 업 량 : 지하차도 2개소 조도개선

○ 사업기간 : 2007. 2 ～ 2007. 12(년중 시행)

○ 사 업 비 : 100백만원

□ 추진상황

○ 남고과도교 조도개선공사 완료 ------------ 2005. 11

○ 진북.어은터널 조도개선공사 완료 --------- 2006. 12

○ 안덕원,월드컵 지하차도 조도개선공사 완료 ----- 2007. 3~6

□ 금후계획

○ 민원발생지역 및 교통사고 잦은 노선 순으로 지속 추진

※ 신속한 민원처리를 위해 단가계약으로 추진

전주천 교량 야간경관 조명 설치

○ 자연형 하천과 어우러진 아름다운 도시야경을 조성하여

천년전주 전통문화도시 이미지 부각

○ 다양한 칼라조명에 의한 아름다운 빛을 연출하여 관광객과

시민에게 볼거리 제공

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주천 백제교(2006. 11.정책조정회의시 선정)

○ 사업내용 : 교량 조형물 및 야간 경관조명 설치

○ 사업기간 : 2007. 1 ～ 2007. 10

○ 총사업비 : 500백만원(국비 300, 시비(추경확보) 200)

※ 실시설계 용역비 : 12백만원

□ 추진상황

○ 전주천 야간경관조명 설치 특별교부세 신청 및 배정 -- 2006. 4~8

○ 야간경관조명 설치대상 선정 및 추진계획수립 -------- 2006. 9~12

○ 설계용역 사전심사 의뢰 및 입찰계약 ---------------- 2007. 1～2

○ 야간경관 과업지시 및 실시설계 용역추진 ------------ 2007. 3~6

□ 금후계획

○ 실시설계 용역 완료 ------------------------ 2007. 7

○ 공사발주 및 완료 -------------------------- 2007. 8~10

중 앙  분 리 대  설 치

○ 중앙선 침범 및 무단횡단으로 인한 도심교통사고 예방

○ 도로중앙화단 수목식재로 녹색가로환경 조성 및 도심 열섬

해소 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 교통사고 잦은 주요 간선도로(4차선 이상 도로)

○ 사업규모 : 41개 노선 61.6㎞

○ 총사업비 : 13,500백만원(국비 6,750, 시비 6,750)

○ 사업기간 : 2002 ～2011(10년)

□ 추진상황

○ 중앙분리대 정비계획 수립 --------------------- 2003. 6.

○ 사 업 량 : 16개 노선 24.3㎞

- 화단형 16.0㎞,  - 방호형 4.0㎞,  - 수벽 4.3㎞

※ 투자액 : 7,128백만원(기투자 - 7,033, 2007년 - 95) 52.1%

○ 2007년 추진사항 : 1개 노선(쑥고개길 0.4㎞)

□ 문제점 및 대책

○ 2007 예산부족으로 중앙분리대 경계석과 화단 객토(가로수 미식재)

➩ 녹지공원과 “도시 숲 조성사업” 으로 가로수 식재(9월경)

□ 금후계획

○ 안덕로 중앙분리대 설치(기린로~구 보안대)

- 구    간 : 기린로 ～ 구 보안대(연장 1.0㎞)

- 소요예산 : 400백만원(국비 200, 시비 200)

아름다운 교량 및 터널 만들기 용역

○ 설치가 오래된 교량의 난간을 현대적 감각으로 리모델링

하여 전통문화도시 이미지 제고

○ 동.서간 연결터널이 준공 후 10여년이 지나 퇴색되고 어두운

터널을 새롭게 정비하여 안전한 통행유도

□ 사업개요

○ 대상시설물 : 8개소(교량 6, 터널 2)

- 교량 : 백제교, 서곡교, 추천대교, 한벽교, 싸전다리, 우림교

- 터널 : 어은터널, 진북터널

○ 총사업비 : 5,600백만원(시비)

○ 사업기간 : 2007 ～ 2010(4년)

□ 추진상황

○ 용역과제 심의 완료 ----------------------- 2006. 10. 24

○ 실시설계용역 계약 및 착수(50백만원) ------- 2007. 04. 27

□ 문제점 및 대책

○ 교량 경관조명 및 구조물 설치시 난간 교체가 검토되어야 하며교량 안전진단 등 많은 사업비 소요

➩ 시범사업으로 전주 관문에 위치한 서곡교와 어은, 진북터널    우선 추진

□ 금후계획

○ 실시설계용역 추진 --------------------- 2007. 4 ~8

○ 조형경관 설계ꡒ안ꡓ검토(자체 및 시정발전연구소) - 2007.6.27~7.10

- 내    용 : 교량 조형난간 및 야간경관 조명설치 등

터널벽면 리모델링 및 주변 조경 등

소송 패소 토지 및 미불용지 매입

○ 미불용지 및 소송 패소토지 미 보상으로 장기간 민원이 제기

되어 왔던 토지를 조기 매입함으로서 민원 해소

□ 사업개요

○ 보상대상토지 : 63건 29,250㎡

○ 매입 예상액 : 5,800백만원

○ 사 업 기 간 : 2007 ～ 2010(4년)

□ 추진상황

○ 토지매입비 지급 : 총 50건  2,788백만원

- 2004년도 : 10건   500백만원

- 2005년도 : 11건   500백만원

- 2006년도 : 16건 1,000백만원

- 2007년 상반기 : 13건 788백만원

□ 문제점 및 대책

○ 소송패소 토지의 보상 지연으로 민원발생

○ 장기 민원 토지부터 우선매입(연차적 보상)

□ 금후계획

○ 소송패소 토지매입 추진

- 소요예산 : 212백만원

- 매입대상 : 4건 정도

자전거 보관대 설치 및 정비

○ 자전거를 이용하는 시민에게 편의를 제공함으로서 자전거 타기를 활성화하여 시민들의 건강을 도모하는 한편 에너지 절약에 기여코자 함.

□ 사업개요

○ 사업내용 : 시내 일원에 자전거 보관대 설치

○ 사 업 량 : 신설 140개소 정도(정비 별도)

○ 사업기간 : 2007. 7 ～ 2007. 11

○ 사 업 비 : 153백만원(보관대설치 143, 보수정비 10)

□ 추진상황

○ 자전거 보관대 수요조사(동) : 112개소

- 신설요구 지역 : 43개소

- 보수요구 지역 : 44개소

- 철거요구 지역 : 25개소

□ 금후계획

○ 신설․보수․철거요구 장소 실사 및 추가소요(다중이용장소) 조사 - 2007.7.1~7.30

○ 보관대 신설 및 정비 용역 --------------- 2007.7.30~8.30

○ 공사발주 및 완료 ---------------------- 2007.9.1~11.30

재난안전관리과 소관

ꊱ	삼천 자연형하천 조성사업 --------------	54
ꊲ	만경강 생태하천 가꾸기 사업 -----------	55
ꊳ	만경강 수계치수 중복천 개수공사 --------	56
ꊴ	아중천 생태하천조성 및 준설사업 --------	57
ꊵ	맑은 물이 흐르는 건산천 가꾸기 ---------	58
ꊶ	전주천 물길복원 및 수질오염 방지사업 --	59
ꊷ	재난 취약계층에 대한 안전복지서비스 강화 --	60

삼천 자연형하천 조성사업

○ 서부지역의 급속한 도시발전으로 삼천 이용객의 급증

○ 수질개선과 생태계 복원 및 각종 편익시설 확대 설치 필요

□ 사업개요

○ 위    치 : 삼천동 삼천교 ～ 팔복동 추천대교

○ 사업규모 : L = 8.05km

○ 총사업비 : 12,441백만원(국비 7,553, 시비 4,888)

○ 사업기간 : 2001 ～ 2007(7개년)

□ 추진상황(전체공정 92%)

○ 기본 및 실시설계 완료 ------------------ 2001. 10. 15

○ 공 사 착 공 ---------------------------- 2001. 12. 31

- 자연형 호안 4.1km, 차집관거 1.4km, 자전거도로 9.7km

- 수질 정화습지 1, 다목적 행사광장 1, 징검다리 4개소

- 체육시설 19개소, 진입개단 5개소, 진출입로 18개소 등

※ 투자액(100%) : 1,783백만원(2006년 계속사업비)

□ 금후계획

○ 수질 정화습지 1개소, 징검다리 2개소 ------- 2007. 8～12    ○ 기타 부대시설 등 사업완공 ----------------- 2007. 7~12

만경강 생태하천 가꾸기 사업

○ 오염된 전주천 하류의 수질개선 및 하천생태계를 복원

○ 전주천, 삼천과 더불어 시민에게 쾌적한 휴식공간을 제공

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 팔복동 추천대교 ～ 만경강 합류부

○ 사업규모 : L= 7.9km(전주천 5.7km, 만경강 2.2km)

○ 총사업비 : 16,637백만원(국 10,772, 도 598, 시 5,267)

○ 사업기간 : 2001 ～ 2010(10개년)

□ 추진상황(전체공정 40%)

○ 기본계획 연구 및 기본설계 --------------- 2001.  4. 24

○ 하천개수 사업 완료(1.9km) ------------- 2003. 12. 31

○ 만경강 생태하천 가꾸기 사업 총괄계약 착공 - 2004. 11. 25

○ 1차~3차분(완료) ------------------------ 2006. 12. 14

- 조경석쌓기 3.2km, 산책로겸 자전거도로 10.89km ,수제설치 13개소

휴게소 3, 운동시설 5, 건널목교 5개소 등

○ 4차분 착수 ------------------------------- 2007. 5. 18

※ 투자액(42%) : 7,026백만원(기투자 5,163, 2007년 1,863)

□ 금후계획

○ 공 사 추 진 ------------------------------ 2007. 7～12

- 식생대 조성 27,923㎡, 하중도 1개소, 수제 2개소 등

○ 전체사업 준공 ---------------------------- 2010. 12

만경강 수계치수 중복천 개수공사

○ 익산지방국토관리청 만경강수계치수 사업으로 선정 위ㆍ수탁 추진

○ 재해 예방과 친환경적인 생태하천으로 조성 시민휴식공간 제공

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 삼천동 쑥고개길 ～ 효자동 삼천 합류점

○ 사업규모 : 용지매입 및 하천개수 L=3.5㎞

○ 총사업비 : 32,000백만원(국비)

○ 사업기간 : 2004 ～ 2010(7개년)

□ 추진상황(전체공정 15%)

○ 위․수탁공사 협약 체결(익산청⇔전주시) --- 2003. 6. 9

○ 하천정비 시행계획 고시 ------------------- 2005. 8. 2

○ 토지 및 지장물 보상 협의 착수 ------------ 2005. 8.20

○ 공사 총괄계약 및 1차분 공사 착공 --------- 2005.10.21

○ 1차분 공사 준공 -------------------------- 2006.10.30

- 축대 및 호안설치 345m, 수로이설 153m

○ 2차분 공사 착공 및 토지보상 추진 --------- 2007. 4 ～

※ 투자액(21%) : 7,343백만원(기투자 3,203, 2007년 4,140)

□ 금후계획

○ 공사추진 --------------------------------- 2007. 7～12

- 교량 1개소, 호안 및 축제 800m, 토지 및 지장물 보상 1식

○ 전체사업 준공 ---------------------------- 2010. 12

아중천 생태하천조성 및 준설사업

○ 도심하천인 아중천에 대하여 수질개선 및 하천정비 시행

○ 재해사전 예방 및 하천생태 환경을 복원하여 시민휴식공간 제공

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 우아동 아중리 복개종점 ～ 소양천 합류부

○ 사업규모 : L= 2.88㎞

○ 총사업비 : 4,400백만원(국 2,600, 도 900, 시 900)

○ 사업기간 : 2004 ～ 2008(5개년)

□ 추진상황(전체공정 30%)

○ 설계심의 등 행정절차 완료 ------------------- 2006. 7. 7

○ 총괄공사 계약 및 1차분공사 착공 ------------- 2006. 9. 7

- 1차분 : 교량 1개소(우정신세계앞), 저수호안공 1,975m

○ 2차분 공사착공 ------------------------------ 2007. 4. 2

※ 투자액(52%) : 2,330백만원(기투자 1,330, 2007년 1,000)

□ 금후계획

○ 공 사 추 진 ---------------------------------- 2007. 7～12

- 인도교 1개소, 취수보(어도포함) 1개소

- 토지보상 : 24필지. 7,378㎡

○  전체사업 완공 ------------------------------ 2008. 12

맑은 물이 흐르는 건산천 가꾸기

○ 건산천을 맑은 물이 흐르는 하천으로, 지역 주민과 함께 조성하여 전주시 관문을 아름답게 가꾸고자 함

□ 사업개요

○ 위    치 : 금암동 시외버스터미널 ~ 전주천 합류점

○ 사업규모 : 미복개구간  L= 875m

○ 총사업비 : 6,350백만원

○ 사업기간 : 2007 ～ 2009(3개년)

□ 추진상황

○ 전주시 용역과제심의위원회 심의 ---------- 2006. 10

○ 건산천 가꾸기 사업 기본방향설정 --------- 2006. 12

○ 기본계획 및 실시설계 착공 --------------- 2007. 6. 22

□ 금후계획

○ 기본계획 및 실시설계 추진 ----------- 2007. 7～2008. 5

○ 실시설계에 따른 사업추진(환경부 사업반영 요구) -- 2008～2009

전주천 물길복원 및 수질오염 방지사업

○ 기능을 상실한 보 철거를 통한 생태통로의 복원(옛 물길 찾기)

○ 보 상류 하상구조상 초기 우수유입 퇴적으로 오염, 악취 발생 예방

○ 매년 봄철(4~5월) 부영양화 등 물고기 폐사사고 방지

□ 개    요

○ 위    치 : 덕진구 덕진동 명성 강변아파트 앞

○ 규    모 : 보 높이 3.1m  길이 88.4m

○ 사 업 비 : 900백만원(국비 630, 시비 270)

○ 사업기간 : 2007 ~ 2008(2개년)

□ 추진상항

○ 하가지구 택지개발로 용도 폐지되는 덕진보개량 용역 추진 - 2006. 01

○ 상∙하류의 생물조사, 물리,화학,생태적 하천조사 - 2006. 04

○ 철거 및 개량에 따른 하상변동 예측 모의실험 결과보고 - 2006. 11

○ 철거 및 개량에 다른 전문가 자문회의 개최 ------ 2006. 11

○ 실시설계 용역 완료(개량 ⇒ 완전 철거) -------- 2007. 02

○ 2007년도 하반기 자연형 하천정화사업 반영(환경부) - 2007. 06. 14

□ 금후계획

○ 환경부 세부 사업계획 협의 등 행정절차 이행 --- 2007. 07

○ 공 사 착 공 ---------------------------------- 2007. 09

○ 공 사 준 공 ---------------------------------- 2008. 02

재난 취약계층에 대한 안전복지서비스 강화

○ 국민기초 생활보장 수급자 대부분이 당장 생계유지에 급급      하여 생활안전 문제에 소홀

○ 시민의 생명과 재산을 보호하는 안전도시 구축

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 재난취약계층에 대한 안전복지 서비스 실시

○ 사 업 비 : 20백만원

○ 사업기간 : 2007. 2 ～ 2007.  5

○ 사 업 량 : 2,000 세대

○ 사업내용 : 가정용 소화기 (하론가스) 지급

□ 추진상황

○ 지원대상 세대 조사실시 --------------------- 2006. 12

○ 소화기(하론가스) 구입 ---------------------- 2007. 5. 3

○ 소화기(하론가스) 지급 완료(19,700천원) - 2007. 5. 29～6. 5

하수관리과 소관

ꊱ	하수관거정비 민간투자(BTL) 사업 -----	62
ꊲ	노송천 복원 프로젝트------------------	63
ꊳ	화산․덕진 처리구역 하수관거 정비사업 --	64
ꊴ	동서학동(원당,객사) 차집관거 설치사업 -	65
ꊵ	송천동(붓내마을) 3단계 차집관거 증설사업 --	66
ꊶ	하수처리 편입구역 차집관거 설치공사 ---	67
ꊷ	하수슬러지 처리시설 설치사업 ----------	68
ꊸ	하수처리장 기존1,2단계 고도처리사업 ---	69
ꊹ	하수처리장 홍보관 설치 --------------	70
	3단계 공원부지 운동시설 조성 ----------	71

하수관거정비 민간투자(BTL)사업

○ 민간자본 유치로 지역경기를 활성화 하고 정화조 폐쇄로 시민부담 경감

○ 오수관거 정비로 하천 수질개선 및 불명수를 차단 하수처리비 절감

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 일원(덕진, 아중, 중앙, 화산, 효자처리구역)

○ 사 업 량 : 하수관거 정비(우․오수 분리) L = 127Km

○ 사 업 비 : 107,361백만원(민간자본)

○ 사업기간 : 2005 ～ 2010(6개년)

□ 추진상황(전체공정 7%)

○ 업무 위․수탁 협약체결(환경부, 도, 시, 환경관리공단) - 2005. 6. 9

○ 시설사업 기본계획고시(민투법 제8조, 10조) - 2005. 6.17

○ 시의회 의무부담행위 동의안 의결 ------------ 2005. 9. 9

○ 민간사업자 사업계획서 평가 및 우선협상대상자 선정 - 2005.10.13

○ 협상 및 사업시행자 지정(전주아랫물길(주)) -- 2006. 4. 9

○ 우선시공분 시설사업 실시계획 승인 및 착공 ----- 2006. 4.25

○ 전체분 시설사업 실시계획 승인 및 착공 -------- 2007. 4.24

- 전체 127km 중  7.5km 완료

□ 금후계획

○ 공사준공 및 성과보증(13개월) -------------- 2011. 5

○ 사업시행자 관리 운영(20년간) -------------- 2011～2030

노송천 복원 프로젝트

○ 하수도화된 노송천 복개구간 자연형 하천으로 복원 환경개선

○ 도심속의 수변공간 제공 및 침체된 구도심 활성화 도모

□ 사업개요

○ 위    치 : 시청앞 노송광장 ～ 진북동 한국은행

○ 사 업 량 : 하천복원 L=1,1Km, B=15～25m

○ 사 업 비 : 375억원(국비 251, 시비 124)

○ 사업기간 : 2007 ～ 2010(4개년)

□ 추진상황

○ 노송천 복개도로 철거공사 -------- 2006. 9～2007. 5

○ 정책토론 및 간담회 개최 ------------------- 2007. 1

○ 2008년도 예산신청(환경부) ---------------- 2007. 2

○ 노송천 복원 민․관 협의회 구성 및 운용 ---- 2005. 4. 5

○ 기본(종합)계획 및 실시설계용역 착수 ------- 2007. 4. 6

□ 금후계획

○ 설계자문 심의 및 공사사전심사 완료 --------- 2007. 9

○ 기본(종합)계획 및 실시설계용역 완료 --------- 2007.10

○ 공사착공 및 완료 ------------------ 2007.11～2010.12

화산․덕진 처리구역 하수관거 정비사업

○ 하수관거 우․오수 분리를 통하여 민간위탁중인 하수처리비 절감

○ 전주천, 삼천 수질개선과 건물 정화조 폐쇄로 시민 보건위생 향상

□ 사업개요

○ 위    치 : 화산처리구역 1․4․7분구, 덕진처리구역 1분구

○ 사업규모 : 우․오수관 분리등 관거정비 L=70㎞

○ 사업기간 : 2004 ～ 2008(5개년)

○ 사 업 비 : 39,728백만원(국비 19,583, 시비 20,145)

□ 추진상황(전체공정 70%)

○ 1,2차분(동서학동, 덕진동 부근) L= 11.2Km 공사완료 - 2005. 9. 9

○ 3차분(대학병원, 금평초교) L= 23.0Km 공사완료 - 2006.12.22

○ 4차분(효자택지, 서신2택지) 착공  ------------- 2006. 5. 4

- 계획연장 L= 23.1Km 중 21.2Km 완료

○ 5차분(호반촌, 인후동 육지구) 착공 ------------ 2007. 5. 2

- 계획연장 L= 7.4Km 중 1.2Km 완료

□ 금후계획

○ 4차분(효자택지, 서신2택지) 완료 -------------- 2007.10

○ 5차분(호반촌, 인후동 육지구) 완료 ------------ 2007.12

○ 잔여분(L= 5.3Km) 착수 ------------------- 2008. 3

○ 전체 사업 완료 ------------------------------ 2008.12

동서학동(원당,객사) 차집관거 설치사업

○ 상류 농촌동 지역 발생 오수를 관거설치 차집처리 전주천 수질개선

○ 정화조 폐쇄 차집관거에 직접연결 시민의 보건위생 향상

□ 사업개요

○ 위    치 : 농촌동 3개마을(동서학동 내원당, 외원당, 객사)

○ 사업규모 : 하수관거 정비 L=8.0㎞

○ 사업기간 : 2004 ～ 2007(4개년)

○ 사 업 비 : 3,364백만원(국비 1,682, 도비 841, 시비 841)

□ 추진상황(전체공정 75%)

○ 사업계획 확정 통보(환경부)    --------------- 2004.12. 7

○ 기본계획 및 실시설계 용역완료    ------------ 2005. 9.12

○ 1차분(동서학동 객사마을 L=1.5Km) 공사완료 -- 2006. 8. 7

○ 2차분(동서학동 객사마을 L=0.7Km) 공사완료 -- 2006.12. 8

○ 3차분 계획연장 착공 ------------------------- 2007. 4. 2

- 하수관거 정비  5.8㎞ 중 3.5㎞ 완료(3차분 공정 60%)

□ 금후계획

○ 사 업 준 공 --------------------------------- 2007.12

- 하수관거정비 잔여구간 2.3km 완료

송천동(붓내마을) 3단계 차집관거 증설사업

○ 차집관거의 용량부족으로 우천시 주거지역(송천동 붓내마을)

오수역류 민원해소

○ 전주천, 삼천등 주요 우수토실 개량으로 하천수등 불명수유입

차단으로 민간위탁 운영중인 하수처리비 절감

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 송천동(우수토실개량 : 전주천, 삼천)

○ 사 업 량 : 차집관거 증설 L= 1.56Km, 우수토실 개량 6개소

○ 사 업 비 : 4,023백만원(국비 2,011, 도비 1,006, 시비 1,006)

○ 사업기간 : 2006 ～ 2007(2개년)

□ 추진상황(전체공정 70%)

○ 기본 및 실시설계 용역 완료 ----------------- 2005.12.30

○ 공 사 착 공 -------------------------------- 2006. 7. 4

- 우수토실 개량 6개소 완료

- 차집관거 증설 1.56㎞ 중 1.20㎞ 완료

□ 금후계획

○ 사 업 준 공 ------------------------------- 2007.12

- 차집관거 증설 잔여구간 0.36km 완료

하수처리 편입구역 하수관거 정비공사

○ 도심하천 상류지역의 생활오수를 차집하여 하수처리장에 유입

○ 공공수역 수질오염 방지로 도심속의 쾌적한 수변공간 제공

○ 농촌동 마을하수도 개량으로 보건위생 증진

□ 사업개요

○ 위    치 : 평화동 장교마을 등 54개 마을

○ 사 업 량 : 하수관거 설치  L = 51.6km

○ 사 업 비 : 32,100백만원(국비 16,050, 시비 16,050)

○ 사업기간 : 2007 ~ 2010(4개년)

□ 추진상황

○ 하수도정비 기본계획변경 용역 전문가 간담회 - 2006. 9

- 농촌동 생활오수 하수처리장에 직접 연결 처리 제시

○ 2008년도 예산신청(환경부) ----------------- 2007. 2

○ 기본 및 실시설계 용역 착수 ----------------- 2007. 6. 8

□ 금후계획

○ 설계자문 심의 및 공사사전심사 완료 -------- 2007.11

○ 기본 및 실시설계 용역완료 ----------------- 2007.12. 7

○ 공사 착공 및 완료 ------------------ 2008. 3~2010.12

하수슬러지 처리시설 설치사업

○ 런던 96의정서 발효에 따른 하수슬러지 해양배출기준 강화

○ 향후(2012년) 해양투기 금지로 슬러지의 안정적 처리시설 필요

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 송천동2가 환경사업소내(미확정)

○ 사업규모 : 슬러지처리시설(180톤/일)

○ 사업기간 : 2006 ~ 2010(5개년)

○ 사 업 비 : 240억원(국비 120, 지방비 120)

□ 추진상황

○ 기본 및 실시설계 용역 착수 ---------------- 2003. 8.26

○ 용역 중지(공정율 81%) -------------------- 2004.12.06

○ 처리방식 결정을 위해 국내․외 시설견학 ---- 2006.11~

○ 공법설명회 개최(전문가,시의원 등 9명) ----- 2007. 4.18

□ 금후계획

○ 시설 위치 및 처리방식 결정 ---------------- 2007. 9

○ 기본 및 실시설계 용역 재개 ---------------- 2007. 9

○ 슬러지 처리시설 공사 시행 ----------------- 2008~2010

하수처리장 기존1,2단계 고도처리사업

○ 2001. 9월 하수도법 개정으로 수질기준 강화(2004. 1. 1)

○ 기존시설 개량으로 만경강 등 새만금 유역 수질개선 도모

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 송천동2가 1035번지(환경사업소 내)

○ 사업규모 : 303천톤/일, 고도처리공법(CNR공법)으로 개선

○ 사 업 비 : 600억원(국비 300, 지방비 300)

○ 사업기간 : 2002. 3 ～ 2007. 11 (6개년)

□ 추진상황

○ 고도처리공사 착공 ------------------------- 2004.10.24

○ 수처리공정 2단계(200천톤) 완료 ----------- 2006. 2.28

○ 수처리공정 1단계(103천톤) 완료 ----------- 2006.10.14

○ 건축, 조경, 도로포장 등 완료 --------------- 2007. 6

- 성능시험 결과 보완 및  종합시운전 진행중

□ 금후계획

○ 종합시운전 완료 및 사업 준공 -------------- 2007.11.

하수처리장 홍보관 설치

○ 하수처리장의 혐오시설 인식을 탈피하고 환경보전의 중요성을 일깨움

○ 체험교육장 및 홍보공간으로 행정의 신뢰감을 갖는 장소로 적극 활용

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 송천동 환경사업소 관리동 내

○ 사업규모 : 전시홀 및 시청각실 등 총 452㎡(137평)

○ 사업기간 : 2007. 3 ~ 2007. 12

○ 사 업 비 : 6억원 정도

□ 추진상황

○ 홍보시설 견학(진해 하수처리장 외 3개소) ---- 2007. 3. 7

○ 실시설계 용역착수 -------------------------- 2007. 4.19

○ 시의회 간담회(도시건설위원회) -------------- 2007. 6.19

□ 금후계획

○ 실시설계 용역완료 완료 --------------------- 2007. 7

○ 홍보실 공사 착공 --------------------------- 2007. 8

○ 공사완료 및 일반인 개방 -------------------- 2007.12

3단계 공원부지 운동시설 조성

하수처리장 3단계 증설 사업시 조성된 공원부지에 대하여 주민

친화 기능에 최대한 부합되는 체력 단련시설의 설치를 통해 하수

처리장이 혐오시설이 아닌 즐겨 찾는 곳으로의 인식변화 도모

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 송천동2가 1035번지(3단계 공원부지내)

○ 사업규모 : 축구장 2면, 테니스장 2면, 족구장 2면

○ 사 업 비 : 18억원 정도

○ 사업기간 : 2007. 5 ~ 2008. 6

□ 추진상황

○ 조성계획 수립 및 도시건설위원회 간담회 ----- 2007. 2.28

○ 실시설계 용역 착수 ------------------------- 2007. 5.23

□ 금후계획

○ 실시설계 용역 완료 ------------------------- 2007. 8

○ 사업 착수 ---------------------------------- 2007.10

○ 사업완료 ----------------------------------- 2008. 6

차량등록사업소 소관

ꊱ	자동차 정기 무상점검 서비스 실시 ------	73
ꊲ	민원폭주 해소를 위한 『집중투입제』 실시 ----	74
ꊳ	자동차와 함께 하는『드림팀』 운영 ------	75
ꊴ	자동차 번호판 제작소 행정 지도 --------	76

자동차 정기 무상점검 서비스 실시

○ 자동차 이전등록을 위해 차량등록사업소를 방문하는 차량에 무상

점검 서비스를 실시 자동차 안전운행 의식 고취

○ 매주 금요일에 실시하는 「자동차관련 상담 드림팀」운영 일정에

맞추어 ONE-STOP 행정 서비스 체제 구축 시민만족 행정 구현

□ 사업개요

○ 일시․회수 : 매월 셋째주 금요일

○ 실시기관 : 자동차 3사 정비업체(현대, 대우, 기아)

○ 실시장소 : 차량등록사업소 후정 주차장

○ 점검내용 : 무상점검, 간단한 소모품은 차주 소지 교체 지원 교육

□ 추진상황

○ 자동차 3사 정비업체 협의 완료 ----------- 2007. 1. 15

○ 무상점검 실시 --------------------------- 3회 142대

□ 문제점 및 대책

○ 동절기 난방시설 미비로 인한 무상점검 추진 어려움 발생

○ 방문차량 활용도 저조 예상

➩ 시민 홍보(플래카드 게첨, 언론보도 등) 철저로 다시 찾는 계기 정착화

□ 금후계획

○ 자동차 3사 서비스 센터 협조 출장 점검반 지원 요청

○ 장소와 시간 효율적 운용을 위하여 오전․오후 점검회사 분리

○ 매월 셋째주 금요일 실시 계획 사전 홍보

민원폭주 해소를 위한『집중투입제』실시

○ 자동차 전국 번호판제 시행 및 전북 시․군 차량에 대하여 도내

이전등록이 가능하여 민원인 증가

○ 자동차 등록 민원이 해마다 증가추세에 있음

○ 대기시간 과다소요로 민원인들의 불만으로 민원발생 초래

□ 현    황

○ 일일 민원처리 평균 현황

구 분	계	신 규	이 전	변 경	말 소	압 류	저 당	기 타
월․금요일	4,488	77	268	672	85	1,987	115	1,284
평 일	3,538	51	214	332	55	1,776	92	1,018
증	950	26	54	340	30	211	23	266

○ 평일 20 ～30분 대기, 월․금요일에는 1～2시간 대기

□ 추진상황

○ 전 직원 등록업무(신규․변경․이전) 교육 실시로 민원 해소

➩ 매주 수요일 18:00시 이후 교육 실시

○ 등록업무 창구(신규․변경․이전)직원 유고시 대체 요원 배치

○ 등록업무 창구(자동차 매매상사 접수용)민원에 대해서 가능인원 집중 투입 처리

○ 대기시간 과다소요로 민원 폭주시 민원처리 직원 추가 배치

□ 금후계획

○ 정례적인 전 직원 업무연찬 실시 : 매주 월요일

자동차와 함께하는『드림팀』운영

○ 차량등록사업소를 찾는 고객을 위하여 자동차와 관련된 궁금증 해결 및 권리보호를 위하여『전문가 상담의 날』을 운영 시민이 대만족 할 수 있도록 최고 양질의 서비스를 제공

□ 현    황

구 분	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일
민원처리건수	5,166	3,147	2,458	3,114	3,809

※ 요일별 평균 처리 3,538건/월요일 5,166건으로 68% 증가

□ 추진상황

○ 상담장소 : 차량등록사업소 상담실

○ 상담일시 : 매주 금요일(10:00~17:30)

○ 상 담 원 : 5명(자동차 전문가 각 1 명)

- 교통안전진흥공단, 전주 자동차 검사소, 보험사,

자동차 매매사업조합, 행정경험이 풍부한 전직 공무원

○ 상담실적 : 105건

□ 문제점 및 대책

○ 자원봉사자 생업 종사로 매회 상담 참여 어려움

➩ 부득이 불참여시 전화 상담제 실시

□ 금후계획

○ 차량 유지 관리 및 보수 상담 실시

○ 사고 예방 및 보험 관련 상담 실시

○ 교통법규 상담 실시

자동차 번호판 제작소 행정 지도

○ 자동차 등록번호판 교부 대행 업무를 수행하는 번호판제작소의

운영을 시민이 신뢰하고 적정한 가격을 유지하도록 행정지도

□ 현    황

○ 업 소 수 : 전주 번호판 제작소 외 6개소

○ 교부매수 : 3,806매/월(2007. 1～2007. 5월까지)

□ 추진상황

○ 지도점검 및 민원조사 2회(2007.3, 2007.5)

○ 강력하고 지속적인 번호판 교부 수수료 인하

- 1999년도 자율결정 16,500원 ➩ 2006.11월 12,000원

○ 업소별 번호판 가격표 종류별 게첨

○ 소비자 요구할 경우 원가계산서 제시하도록 지도

□ 문제점 및 대책

○ 번호판 가격의 자율화로 가격통제 한계

➩ 강력한 지도감독으로 번호판 가격 인하 유도 및 인상 억제

○ 자치단체에서 번호판가격 상한금액을 정할 수 있도록 자동차  관리법 개정 요청(2006. 10)

□ 금후계획

○ 주기적인 지도점검으로 민원불편 최소화 : 분기별 1회

○ 공무 대행인 점을 인식하고 서비스에 최선을 다하도록 지도

○ 번호판 가격이 타 도시와 형평성 유지토록 행정지도