제259회 제2차정례회

도시건설위원회

- 2008년도 제2회 추경 세입‧세출 예산(안) -

주요사업설명서

예 술 도 시 국

Ⅱ 주요 세부사업 설명서

1. 생태복원과 소관

	ꊱ 친수광장 조성사업	-----	14
	노송천 자연형 하천 복원사업	-----	15

ꊱ 친수광장 조성사업(289쪽)

(생태복원과, 허진회, 5164)

1. 사업목적 및 필요성

○ 도심속 8개 주요광장에 특성화된 분수와 휴게시설 등 친수공간을 조성

○ 시민들에게 특색 있는 휴식 공간 제공과 아울러 도심경관 향상

2. 사업근거 및 추진경위

○ 민선4기 시장 공약사업

○ 투융자심사 및 기본계획 용역과제 심의 완료 : ‘06.10

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 중화산동 화산체육관 광장 등 8개소

(화산체육관, 홈플러스 앞, 롯데백화점 앞, 비사벌@ 앞, 안덕원사거리, 서곡사거리, 금암로터리, 한국은행 앞)

○ 사업규모 : 친수광장 8개소 조성

○ 총사업비 : 10,500백만원(시비)

○ 사업기간 : 2007 ~ 2010

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 중기지방재정계획 반영(여)   ○ 투․융자 심사 이행 (여)

○ 공유재산관리계획 승인(  )   ○ 용역과제 심사 이행(여)

5. 그간 추진사항

○ 투융자 심사 및 기본계획 용역과제 심의 완료 ----------------- ‘06. 10

○ 기본계획 및 화산체육관 벽천 실시설계 -------------- ‘07. 04~‘08. 04

○ 롯데백화점 앞 친수광장조성 시비부담분 확보(1회추경) -------- ‘08. 06

○ 화산체육관 앞 벽천조성 공사 완공 --------------------------- ‘08. 08

○ 화산체육관 광장 등 3개소 실시설계용역 착수 ----------------- ‘08. 09

6. ‘08년 제2회 추경 예산소요

○ 사 업 량 : 1개소(롯데백화점 앞) 친수광장 조성

○ 소요예산 : 600백만원 (도비 400 , 시비 200)

○ 사    유 : 도의원의 롯데백화점 앞 친수광장 조성사업비(400백만원)지원으로 시비 200백만원(1회추경)을 기 확보하였으며, 도비 배정에 따른 예산편성

7. 연도별 투자계획(신규/계속)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘08.제2회 추경	‘08.이후	비 고
계		10,500	1,410	400	8,690
국비	국고보조
	균특회계
	특 교 세
도 비		800		400	400
시 비		9,700	1,410		8,290

ꊲ 노송천 자연형 하천 복원사업(290쪽)

(생태복원과, 육완만, 5167)

1. 사업목적 및 필요성

○ 노송천에 맑은 물을 흐르게 하여 자연과 어우러진 수변공간 제공

○ 특색 있는 거리조성으로 삶의 질 향상과 구도심 활성화 기여

2. 사업근거 및 추진경위

○

3. 사업개요(전체분)

○ 위    치 : 시청 앞 노송광장 ~ 진북동 한국은행(1단계)

○ 사 업 량 : 하천복원 L=1.1㎞  B=15~25m

○ 사 업 비 : 31,500백만원(국비22,000, 지방비9,500)

○ 사업기간 : 2007~2010(4개년)

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 중기지방재정계획 반영(여)       ○ 투․융자 심사 이행 (여)

○ 공유재산관리계획 승인(  )       ○ 용역과제 심사 이행(  )

5. 그간 추진사항

○ 노송천복원 민․관협의회 구성 및 운영(7회) -------------------- '07. 4

○ 중앙부처 재원협의 및 설계검토 완료 -------------------------- '08. 2

○ 도시계획시설(도로) 결정(변경) ------------------------------- '08. 4

○ 공사착공 및 책임감리용역 착수 ------------------------------- '08. 6

○ 기공식 ------------------------------------------------------ '08. 9

6. ‘08년 제2회 추경 예산소요

○ 소요예산 : 1,500백만원(국가예산 추가배정)

7. 연도별 투자계획(계속)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘08.제2회 추경	‘08.이후	비고
계		31,500	7,793	1,500	22,207
국비	국고보조	22,000	873	1,500	19,627
	균특회계
	특 교 세
도 비
시 비		9,500	6,920		2,580

2. 푸른도시조성과 소관

	ꊱ 덕진공원 건지산 등산로 및 숲조성		-------				17
	새터어린이공원 운동시설 개선사업		-------				18
	서일공원 운동시설 설치 사업	----------					19
	ꊴ 양지뜸공원․효열공원 운동시설설치 사업					----	20

ꊱ 덕진공원 건지산 등산로 및 숲조성 (291쪽)

(푸른도시조성과, 전창영, 281-2286)

1. 사업목적 및 필요성

○ 덕진공원 건지산을 시민의 건강증진의 웰빙공간으로 조성

○ 편백림 숲 등 양호한 숲 공간에 산림욕을 위한 편의시설 설치로 산림훼손 방지 및 이용편익 제공

2. 사업근거 및 추진경위

○ 사업근거 : 도심의 숲조성 공간으로 이용객 증가에 따른 편의시설 설치와 자연환경 보존을 위한 등산로 정비

○ 사업수행주체 : 전주시

○ 사업진행절차 : 일반경쟁 입찰 도급시행

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 덕진공원 건지산 일원

○ 사업규모 : 편의시설 설치 및 등산로 정비 L= 1,680m

○ 총사업비 : 150백만원(도비 50,  시비 100)

○ 사업기간 : 2008. 10. ~ 12

○ 지원형태 : 직접수행

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 용역과제 심사 이행(여)   ○ 기  타(          )

5. 그간 추진사항

○ 2008년도 도비보조사업 교부결정 통보 ---------------------- ’08. 6. 24

○ 건지산 편의시설 설치 및 보수공사 실시설계 용역완료  ------- ’08. 7. 10

○ 설계자문 및 전북대학교측과 협의   ------------------------- ’08. 6. 13

○ 시의원 및 환경단체 전문가 현장자문   ---------------------- ’08. 8. 30

○ 공사 착공  ------------------------------------------------ ’08. 10. 9

6. ‘08년 제2회 추경 예산소요

○ 사 업 량 : 건지산 등산로정비 L = 1,680m

○ 소요예산 : 50백만원

○ 사    유 : 2008년도 도비보조사업 교부결정 통보

7. 연도별 투자계획(신규/계속)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘08.제2회 추경	‘08.이후	비고
계		150		50	100
국비	국고보조
	균특회계
	특 교 세
도 비		50		50
시 비		100			100

ꊲ 새터어린이공원 운동시설 개선사업(292쪽)

(푸른도시조성과, 한호수, 2437)

1. 사업목적 및 필요성

○ 다목적 운동장의 시설정비 및 우레탄 포장으로 이용성 제고

○ 생활체육 활성화로 시민의 건강증진 및 쾌적한 공원환경 조성

2. 사업근거 및 추진경위

○ 사업근거 : 도비보조사업

○ 사업수행주체 : 푸른도시조성과, 사업진행절차: 자체설계, 입찰, 착공

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 전주시 완산구 평화2동 새터어린이공원 내

○ 사업규모 : 다목적 구장 콘크리트 및 우레탄 포장 304㎡

야간조명시설(투광기) 1식

○ 총사업비 : 35,000천원 ( 도비 35,000)

○ 사업기간 : 2008. 10. 24 ~ 12. 20

○ 지원형태 : 직접수행

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 용역과제 심사 이행(  )   ○ 기  타( 예산성립전 사용승인  )

5. 그간 추진사항

○ 도비요구 및 예산 성립전 사용승인 ------------------------  ‘08. 9.16

○ 자체설계 및 발주의뢰  -------------------------------------‘08.10.15

6. ‘08년 제2회 추경 예산소요

○ 사 업 량 :다목적 구장 우레탄 포장 304㎡, 야간조명시설(투광기) 1식

○ 소요예산 :35,000천원

○ 사    유 :도비보조사업 예산 성립전 사용후 예산 반영

7. 연도별 투자계획(신규)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘08.제2회 추경	‘08.이후	비고
계		70	35	35
국비	국고보조
	균특회계
	특 교 세
도 비		35		35
시 비		35	35

ꊳ 서일공원 운동시설 설치사업(292쪽)

(푸른도시조성과, 한호수, 2437)

1. 사업목적 및 필요성

○ 족구장 콘크리트 포장 및 우레탄 포장으로 이용성 제고

○ 생활체육 활성화로 시민의 건강증진 및 쾌적한 공원환경 조성

2. 사업근거 및 추진경위

○ 사업근거 : 도비보조사업

○ 사업수행주체 : 푸른도시조성과, 사업진행절차: 자체설계, 입찰, 착공

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 전주시 완산구 서신동 서일공원 내

○ 사업규모 : 족구장 콘크리트 및 우레탄 포장 480㎡, 부대공 1식

○ 총사업비 : 40,000천원 ( 도비 40,000)

○ 사업기간 : 2008. 11.  ~ 12. 30

○ 지원형태 : 직접수행

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 용역과제 심사 이행(  )   ○ 기  타( 예산 성립전 사용승인  )

5. 그간 추진사항

○ 도비요구 및 예산 성립전 사용승인 -------------------------  ‘08. 9. 25

○ 자체설계 --------------------------------------------------  ‘08.11.14

6. ‘08년 제2회 추경 예산소요

○ 사 업 량 :족구장 우레탄 포장 480㎡, 부대공 1식

○ 소요예산 :40,000천원

○ 사    유 :도비보조사업 예산 성립전 사용후 예산 반영

7. 연도별 투자계획(신규)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘08.제2회 추경	‘08.이후	비고
계		40		40
국비	국고보조
	균특회계
	특 교 세
도 비		40		40
시 비

ꊴ 양지뜸공원․효열공원 운동시설 설치사업(292쪽)

(푸른도시조성과, 한호수, 2437)

1. 사업목적 및 필요성

○ 야외용 헬스 운동시설 설치로 시민의 건강증진 기여 및 생활체육 활성화

2. 사업근거 및 추진경위

○ 사업근거 : 도비보조사업

○ 사업수행주체 : 푸른도시조성과, 사업진행절차: 자체설계, 입찰, 착공

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 전주시 완산구 효자4동 양지뜸, 효열공원 내

○ 사업규모 : 놀이터 탄성포장 350㎡, 야외용 헬스기구 8대

○ 총사업비 : 40,000천원 (도비 40,000)

○ 사업기간 : 2008. 11. 6 ~ 12. 10

○ 지원형태 : 직접수행

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 용역과제 심사 이행(  )   ○ 기  타(예산 성립전 사용승인 )

5. 그간 추진사항

○ 도비요구 및 예산 성립전 사용승인 -------------------------- ‘08. 9. 25

○ 자체설계 및 발주의뢰 -------------------------------------- ‘08. 11. 5

6. ‘08년 제2회 추경 예산소요

○ 사 업 량 :놀이터 탄성포장 350㎡, 야외용 헬스기구 8대

○ 소요예산 :40,000천원

○ 사    유 :도비보조사업 예산 성립전 사용후 예산 반영

7. 연도별 투자계획(신규)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘08.제2회 추경	‘08.이후	비고
계		40		40
국비	국고보조
	균특회계
	특 교 세
도 비		40		40
시 비

3. 환경과 소관

	ꊱ 전라북도지사배 미용예술경연대회		-------				22

ꊱ 전라북도지사배 미용예술경연대회(293쪽)

(환경과, 김민영, 2371)

1. 사업목적 및 필요성

○ 전라북도 미용인의 화합과 기술향상을 꾀하며,

○ 도민과 미용인의 교류를 통한 미용인의 위상을 제고시켜

○ 미래산업으로 성장의 발판을 구축하고 국제화시대에 부응하기 위함

2. 사업근거 및 추진경위

○ 2008년 전라북도 시책사업의 원활한 추진

3. 사 업 개 요

○ 일    시 : 2008. 09. 30.

○ 행사규모 : 일반부16종목, 학생부19종목 경기진행으로 중앙회 K․B․F

(중앙미용예술경영대회) 출전기회 부여

○ 총사업비 : 44백만원(보조금25, 자체부담19)

○ 재    원 : 전액도비(25백만원)

○ 지 급 처 : (사)대한미용사회전북지회(지회장:김순금)

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 용역과제 심사 이행(부)       ○ 기  타(          )

5. 그간 추진사항

○ 2008.09.30.제7회 전라북도지사배미용경연대회 개최완료

6. ‘08년 제2회 추경 예산소요

○ 사 업 량 : 1식

○ 소요예산 : 25백만원

○ 사    유 : 제7회 전라북도지사배미용경연대회 개최

7. 연도별 투자계획(신규/계속

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘08.제2회 추경	‘08.이후	비고
계		25	25	25
국비	국고보조
	균특회계
	특 교 세
도 비		25	25	25
시 비		0	0	0