제259회 제2차정례회

도시건설위원회

- 2009년도 세입‧세출 예산(안) -

주요사업설명서

비전사업추진단

Ⅱ 주요 세부사업 설명서

1. 비전사업팀 소관

	≪일반회계≫
	ꊱ 컨벤션사업 추진	-----	8

2. 전략사업팀 소관

	≪특별회계≫
	서부신시가지 조성사업	-----	9

ꊱ 컨벤션사업 추진(557쪽)

(비전사업팀, 김정환, 281-5028)

1. 사업목적 및 필요성

○ 현 덕진종합경기장 부지개발을 위해 사업총괄기획, 타당성조사·분석,

민간사업자공모지침서, 사후관리 등 전과정에 걸쳐 사업관리가 필요

2. 사업근거 및 추진경위

○ 덕진 종합경기장 부지개발로 도심공간구조 개편을 통한 구도심 활성화

○ 1980년에 증·개축한 시설물로서 재건축이 필요(안전점검:C등급)

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 덕진동1가 1220-16번지 일원(현 종합경기장)

○ 사업규모 : 부지면적127,906㎡(컨벤션홀13실, 호텔150실 정도)

○ 총사업비 : 1,735억원 정도(컨벤션785, 호텔950)

○ 사업기간 : 2008 ～2014(민간자본유치방식)

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 용역과제 심사 이행(○)     ○ 기  타(  )

5. 그간 추진사항

○ 도시기본계획 변경	2007. 05월

○ 공청회 2회 실시(전문가 및 시민 여론 수렴)	2007.06월,09월

○ 공유재산관리변경동의 및 테니스장 부지교환	2008. 08월

6. ‘09년 예산소요

○ 사 업 량 : 건설사업관리 용역 1식(사업총괄기획, 민간사업자 공모지침서 등)

○ 소요예산 : 200백만원 정도

○ 사    유 : 우리시에서 가장 유리한 민간사업자 공모, 선정 추진

7. 연도별 투자계획(신규/계속)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘09 년	‘10 이후	비고
계		173,500		200	173,300
국비	국고보조
	균특회계
	특 교 세
도 비
시 비		200		200
민 자		173,300			173,300

ꊲ 서부신시가지 조성사업(876쪽)

(전략사업팀, 이동식, 281-5059)

1. 사업목적 및 필요성

○ 전라북도 중추적기능을 담당할 수 있는 미래지향적인 신시가지 조성

○ 신시가지내 미관광장 및 실개천조성으로 시민휴식공간과 친수공간 제공

○ 기반시설물의 유지보수 및 민원해소, 법적 부담경비 지출

2. 사업근거 및 추진경위

○ 도시개발법

○ 개발구역지정 → 개발계획수립 → 실시계획인가 → 착공 → 공사완료

→ 환지처분(청산금 징수․교부) → 사업준공 → 지구 유지관리

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 전주시 완산구 효자동 서부신시가지일원

○ 사업규모 : 부지조성 2,536,677㎡, 교량 3개소, 공원 12개소

○ 총사업비 : 4,560억원

○ 사업기간 : 1999.02. ～ 2008. 08. 30

4. 사전 행정절차 이행 여부

○ 중기지방재정계획 반영(○)       ○ 투․융자 심사 이행 (○)

○ 공유재산관리계획 승인(  )       ○ 용역과제 심사 이행(  )

5. 그간 추진사항

○ 도시개발 시설공사 착공	2003. 2. 27일

○ 도시개발 시설공사 완료	2008. 5. 31일

○ 환지확정처분 및 사업준공	2008. 7. 3일

6. ‘09년 예산소요

○ 사 업 량 : 미관광장 4개소(8,273㎡) 및 실개천 1개소(260m)조성, 신시가지                   DB구축, 지구 유지관리, 청산금지급

○ 소요예산 : 32,836백만원

○ 사    유 : 시민휴식공간과 친수공간 제공, 전산화를 통한 효율적 시설관리,

민원해소 및 법적 부담경비 지출

7. 연도별 투자계획(신규/계속)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기투자액	‘09 년	‘10 이후	비 고
계		456,000	412,571	32,836	10,593
국비	국고보조	2,272	2,272	-	-
	균특회계
	특 교 세
도 비
시 비		453,728	410,299	32,836	10,593