제268회 전주시의회 임시회

복  지  환  경  위  원  회

2010년도

주요업무계획

상하수도사업소

보  고  순  서

□	일 반 현 황		----	1
□	부 서 별 주 요 기 능		----	2
□	기 본 현 황		----	3-7
□	주 요 업 무 추 진 계 획		----	8-32
	○	수 도 행 정 과	----	9-11
	○	급 수 과	----	12-18
	○	수 질 관 리 과	----	19-23
	○	하 수 과	----	24-32

일  반  현  황

□ 기   구 : 4과 13담당(1전산실, 1시험소, 1센터, 17사업장)

																																																								상하수도 사업소
			수도행정과																																					급 수 과																																	수질관리과																				하 수 과
	수도행정							요금							체납징수																						유수율제고										급수시설											누수방지					계량기관리											수질관리					수질분석						생산관리								하수행정			하 수 시설			하수정비
	전산실							누 수 신고 센 터						계량기시험소								방수리취수장			삼천취수장								원당취수장				전미취수장									상관취수장																							인후배수지		천마배수지			효자배수지			완산배수지		송천배수지				서신배수지					금암배수지			화산배수지				대성정수장	지곡정수장		상관정수장	팔복정수장

□ 정‧현원

부 서 직 급		정 원	현 원
			계	수도행정과	급 수 과	수질관리과	하 수 과
합 계		98	96	25	27	32	12
일반직	소 계	56	56	12	16	16	12
	4급	1	1	1
	5급	4	4	1	1	1	1
	6급	13	13	3	4	3	3
	7급	22	33	6	6	13	8
	8~9급	15	6	1	5	-	-
연 구 사		4	3	-	-	3	-
기 능 직		39	36	13	11	12	-

※ 청경 15명,  상용직 22명

부서별 주요기능

과 별	분 장 사 무	비 고
수도행정과	• 상수도사업 경영혁신 및 경영평가 • 지방채 및 자치법규 제․개정 • 계약 및 물품관리 • 상수도사용료 부과징수 업무 • 상수도 검침업무 및 이의신청 • 상수도공기업특별회계 세입 세출예산 및 결산 • 세입현계, 과오납, 환불, 누수감액 • 공기업특별회계 금고계약 및 관리
급 수 과	• 유수율제고 중․장기 계획 • 급수공사 신청서 접수 및 승인 • 노후급수관 교체 및 통합공사 • 상수도 전면개량을 통한 맑은물 공급사업 • 배수관 및 급수관 시설공사 • 누수탐사 및 누수복구 • 누수신고센터 운영관리 • 마을 상수도 유지관리 • 수전관리, 수도계량기 교체 • 계량기 실태조사 및 관리
수질관리과	• 생활용수 수요에 따른 정․원수 확보 • 광역상수도 수급에 관한 업무 전반 • 취․정수장 배수지 등 사업장 시설 유지관리 • 먹는 물 공동시설(지정약수터) 수질검사 • 사업장 시설물 유지관리 • 국가공인 수질검사기관 운영관리 • 공업용수 수급 및 유지보수
하 수 과	• 하수도공기업특별회계 세입 세출예산 및 결산 • 하수도사용료 조정 및 징수관리 • 금강수계관리기금 업무 • 하수관거 정비사업 • 마을하수도 시설 및 유지관리 • 하수처리장 운영관리 및 시설물 유지관리

기  본  현  황

□ 급수 인구

총인구	급수인구	보급율 (%)	1일 1인 급수량(ℓ)	급수전	유수율(%)	무수율(%)	비고
639,922명	634,897명	99.2	403	193,855	61.3	38.7

□ 수계별 생산 및 급수구역

구 분			시설용량 (천㎥/일)	급수량 (천㎥/일)	급 수 지 역	급수인구	비율 (%)
총 계			328	295		634,897	100
생활용수	합 계		258	255	33개동	634,897	100
	자체상수도	대 성	40	35	동․서서학, 중화산1, 완산, 효자1일부, 삼천1일부, 평화1.2일부	82,537	13
	광역상수도	전주권	218	220	중앙,풍남,노송, 서신, 삼천1일부. 2. 3, 중화2, 평화1.2일부, 효자1일부.2. 3. 4, 진북, 인후1.2.3, 금암1.2, 덕진, 우아1.2, 호성, 팔복, 송천1.2, 조촌, 동산.	552,360	87
공업 용수	팔 복 정수장		70	40	팔복동 1, 2공단(18개 업체 공급)

※ 생활용수 급수구역은 생산량 및 수요량에 따라 조절

□ 도․송․배․급수관

〔단위 : ㎞〕

총 연 장	도․송수관	배 수 관	급 수 관	비 고
2,153	57	693	1,403

□ 상수원 보호구역

상수도사업장	보 호 구 역			구역지정일	보호시설
	면적(㎢)	상류(Km)	하류(Km)		안내판	표주
계	27.657				42	132
방수리취수장	0.285	1.0	0.5	72. 5. 5.	7	24
상관수원지	26.655	전유역		24. 6. 9.	10	26
삼천취수장	0.284	2.2 (독배천0.7)	0.3	82. 6.19.	11	42
원당양수장	0.104	1.0	0.1	80. 8. 4.	6	16
전미취수장	0.329	0.5	0.3	67. 8. 5.	8	24

□ 상수원 수계별 『댐』 저수량

수 원	위 치	만수량(천㎥)	관리기관	비 고
계		817,139
상 관 제	완 주 군	2,139	전 주 시	대성수계보충
용 담 댐	진 안 군	815,000	수자원공사	전주권광역

하 수 도  기 본 현 황

□ 하수도

구 분		처리구역 (㎢)	계획연장 (㎞)	시설연장 (㎞)	미시설연장 (㎞)	보급율 (%)	비고
계		54.97	1,826	1,530	296	83.8
합 류 식			0	566	0	100.0
분류식	소 계	54.97	1,826	964	862	52.8
	오수관거	-	902	528	374	58.5
	우수관거	-	924	436	488	47.2

□ 차집관로

하 천 명	연 장 (㎞)	맨 홀 (개)	우수토실 (개소)	환기구 (개소)	여수토실 (개소)
계 (6개노선)	88.9	1,010	251	73	5
전주천 (좌, 우안)	23.5	369	142	37	4
삼 천 (좌, 우안)	15.4	155	45	18
금암천 (좌, 우안)	4.4	82	38	9
아 중 선	12.0	174	16	4
팔복선(공장,생활)	16.9	183	8	5	1
상 관 라 인	10.4	47	2
기 타	6.3

□ 하수․위생처리 시설

구 분	하 수 처 리	위 생 처 리
위 치	덕진구 송천동 2가 1035번지
시설용량	1일 처리능력 ⇨ 403,000㎥ - 1단계 시설 : 113,000㎥ - 2단계 시설 : 190,000㎥ - 3단계 시설 : 100,000㎥	1일 처리능력 ⇨ 290㎘ - 분 뇨 : 30㎘ - 정 화 조 : 260㎘
처리방법	1․2단계 고도처리(CNR)공법 3단계 고도처리(CSBR) 공법	하수 연계처리(1994년부터 시행)

2010년 상수도 공기업 예산

총 규 모 : 55,799백만원

〔단위 : 백만원〕

세 입			세 출
계 : 55,799(100%)			계 : 55,799(100%)
▣ 상수도사업수익 : 53,276(95.5%)			▣ 상수도사업비용 : 45,019(80.7%)
◦ 영업수익 : ․ 급 수 수 익 : ․ 급수공사수익 : ․ 기타영업수익 : ◦ 영업외수익 : ․ 예금수입이자 : ․ 타회계전입금 : ․ 기타영업외수익 :	52,029 49,588 2,089 352 1,247 450 594 203		◦ 인력운영비 : ◦ 운 영 경 비 : ◦ 경 상 이 전 : ◦ 급수 공사비 : ◦ 지급이자 :	6,068 33,055 2,506 1,417 1,973
▣ 자본적수익 : 523(0.9%)			▣ 자본적지출 : 10,780(19.3%)
◦ 자본잉여금수익 :	523		◦ 자본투자비 :	5,858
			◦ 부채상환금 :	4,158
			◦ 기타자본적지출 :	200
▣ 예산외계정 : 2,000(3.6%) (과년도계정)			◦ 예 비 비 :	564

2010년 하수도 공기업 예산

총 규 모 : 32,008백만원

〔단위 : 백만원〕

세 입			세 출
계 : 32,008(100%)			계 : 32,008(100%)
▣ 하수도사업수익 : 16,035(50.1%)			▣ 하수도사업비용 :12,647(39.5%)
◦ 영 업 수 익 : 13,713			◦ 영 업 비 용 : 12,276
. 하수도사용료수익 : . 기타 영업수익 :	13,599 114		. 인력운영비 등 : 1,586 . 운영경비 등 : 593 . 민간위탁대행사업비 : 10,097
◦ 영업외 수익 : 2,322
. 수 입 이 자 : . 타회계전입금수익 :	236 2,086		◦ 영업외 비용 : 251
			◦ 특 별 손 실 : 20
			◦ 예 비 비 : 100
▣ 자본적수익 : 15,733(49.2%)			▣ 자본적지출 : 19,361(60.5%)
◦ 자본잉여금수익:	15,733		◦ 가동설비자산 :	10,576
․ 타회계건설보조금:	12,129
			◦ 비가동설비자산 :	605
․ 공 사 부 담 금 :	3,604		◦ 고정부채상환금 :	1,419
▣ 예산외계정 : 240(0.7%) (과년도계정)			◦ 민간자본이전 :	6,538
			◦ 예 비 비 :	222

부서별 주요업무 추진상황

수도행정과  소관

급 수 과  소관

수질관리과  소관

하 수 과  소관

수 도 행 정 과  소 관

	「더욱 쉽고 다양한」요금 납부방법 개선	--	10
	- 안정재정 확충 실현을 위한 - 체납 상수도사용료 징수율 제고	--	11

「더욱 쉽고 다양한」요금 납부방법 개선

○ 수용가에게 더욱 쉽고 다양한 납부 방법을 제공하여 납부 시 폭넓게

선택할 수 있도록 함으로써 시민만족 실현 및 요금 징수율 제고

□ 현행 납부방법

○ OCR 고지서 납부 : 전주시 소재 시중은행만 납부가능

○ 가상계좌 납부(1개 은행/전북은행)

- 은행 창구 납부 : 전북은행만 가능(타행 창구 납부 불가)

- 인터넷뱅킹 및 현금자동입출금기(ATM)납부 시 전북은행 외에는 수수료 부담

- 가상계좌 납부 시 익일에 납부조회가능

○ 자동이체 신청 납부시 상수도요금의 1% 할인(5,000원 한도)

□ 추진계획

○ 요금 납부방법 개선

구 분		현 재		개 선
가 상 계 좌 납 부		1개 은행(전북은행)		전북은행ㆍ농협 확대
전 자 납 부 번 호 납부		미 시 행		전자 납부 번호 시행
가상계좌 실시간 납부조회		익일에 납부조회 가능		실시간 납부조회 가능

○ 소요예산 : 21,900천원

- 가상계좌관리 서버 및 프로그램구입 : 17,100천원, 가상계좌수수료 : 4,800천원

□ 금후계획

○ 가상계좌와 전자납부 서비스이용 계약체결(농협/금융결재원) : ‘10. 상반기중

○ 가상계좌 관리 및 민원서비스 중계프로그램 도입       : ‘10. 상반기중

○ 더욱 쉽고 다양한 요금 납부방법 지속적으로 적극 홍보   : 년중

『안정재정 확충 실현을 위한』

체납 상수도사용료 징수율 제고

□ 현   황

○ 2009. 12. 31기준                     〔단위 : 천건 /백만원]

구분 년도	조 정 액		징 수 액		체 납 액		징수율 (%)	비고
	건 수	금 액			건 수	금 액
			건 수	금 액
계	2,383	51,669	2,228	49,140	155	2,529	95.1
현년도	2,199	48,379	2,139	46,976	60	1,403	97.0
과년도	184	3,290	89	2,164	95	1,126	65.7

□ 2010년도 징수목표

○ 현년도 : 97.0％(2009년 징수율) ⇒ 97.4%

○ 과년도 : 65.7％(2009년 징수율) ⇒ 66.2%

□ 그간 추진상황

○ 특별징수기간 운영 : ‘09. 5월, 9월～12월

○ 상수도요금 체납자 납부 독려

- 고액․고질 체납자 계고장 교부 : 3,962명 / 2,713백만원

- 검침원 활용 납부 안내문 교부  : 7,262명 / 2,448백만원

○ 고액 및 고질 체납수용가(다량 수용가) 행정조치

- 급수중지(단수) 423개소, 457백만원(개전 367개소, 316백만원)

○ 경락처리 및 행불, 무재산 체납자 결손 : 7,942건 / 171백만원

□ 문제점 및 대책

○ 집합건물 입주자와 생계형 영세상인 등 다수민원 발생

○ 경기침체로 인한 휴ㆍ폐업, 실직자 증가, 부도 등으로 체납액 증가

⇨ 고액체납자, 영세상인 등 분납 유도 납부 징수

□ 금후계획

○ 체납자(20만원 이상)독려부 작성 호별방문 계고장 교부, 납부독려

○ 고액ㆍ고질체납자 유형별 분석, 단수 및 미개전 수용가 지속독려

○ 상습 고액체납 수용가 징수반 편성 합동방문 납부독려(단수조치 등)

○ 체납액 특별 일제정리기간 운영으로 징수율 제고 : 년 2회

급  수  과  소 관

ꊱ	상수도 전면개량을 통한」맑은물 공급사업	--	13
ꊲ	팔복배수지 건설 및 혁신도시 배수관 포설	--	14～15
	상수도 100% 공급사업	--	16
	긴급누수 복구 및 누수탐사	--	17
	신속하고 완벽한 상수도 계량기관리	--	18

「상수도 전면개량을 통한」맑은물 공급사업

○ 2014년까지 유수율 85%이상 향상 및 선진화된 급수체계 구축으로

경영합리화를 도모하고, 노후된 상수도관 교체를 통해 맑고 깨끗한

수돗물을 시민들에게 공급하고자 함

□ 사업개요

○ 사업기간 : ‘09. 3. 24 ～ ’14. 3. 23(5개년)

○ 총사업비 : 1,436억원(1차분 256억원)

○ 사업내용

- 블록고립 및 균등수압 안정화 128개 블록

- 노후블록에 대한 노후관 집중정비 50개 블록

- 통합관리센터 신축(서신배수지내) 및 전산시스템 구축 1식

- 상수도관 매설 703㎞(송․배수관로 279, 급수관로 424)

- 노후계량기 교체 40,768전

▸ 1차분 주요사업 : 블록고립 15개소, 블록정비 11개소, 통합관리센터 신축 1동

□ 그간 추진상황

○ 공 사 착 공  ---------------------------------   ‘09. 3. 24

○ 사업설명회(자원봉사단, 일반시민 등 13회 650여명)   ---- ‘09. 3 ～ 12월

○ 주민설명회(통장회의시) 실시(인후1동 등 11개동 400여명)    -- ‘09. 4 ～ 12월

▸ 공사 추진상황 : 현공정 3.0%(1차분 18%)

- 교동 한옥마을 주변 등 21개소, 상수도관 32.0㎞ 매설완료

□ 문제점 및 대책

○ 계획년도내 사업마무리를 위해서는 2010년도에 370억원의 예산 필요

(2010년도 확보액 35억원)

⇒ 부족예산 335억원(특별회계 135, 일반회계 100, 지방채 100) 확보를 위해서는   제1회 추경에 기 승인된 지방채 100억원 및 일반회계 지원 반드시 필요

□ 금후계획

○ 시민홍보(주민설명회 등) 지속 실시         ------   준공시까지

○ 1차분(금차분) 준공           --------------------   ‘10. 7월

○ 전체분 준공              ------------------------   ‘14. 3월

팔복배수지 건설 및 혁신도시 배수관 포설

○ 기존 송수관에서 직접 공급되는 조촌, 팔복, 동산, 효자4, 송천2, 삼천3

지역에 간접 배수방식으로 공급하고,

○ 국가의 지역균형 발전계획에 따른 혁신도시, 법조타운, 장동 유통단지

및 첨단산업단지 등의 생활용수를 안정적으로 공급하고자 함

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 팔복동･만성동 일원

○ 사업개요

- 배수지 34,500㎥/일(생활용수 30,000㎥, 공업용수 4,500㎥)

- 송․배수관 매설 L=16.3㎞(송수관 7.3㎞,  배수관 9.0㎞)

○ 총사업비 : 36,675백만원(시비 23,217/ 국비 10,153/ 주택공사 3,305)

- 확보예산 : 10,524백만원(시비 7,498  국비 3,026)

※ 기집행(토지매입비등) : 2,910백만원

- 미확보액 : 23,241백만원(시비 12,809/ 국비 7,127/ 주택공사 3,305)

○ 사업기간 : 2009년 ～ 2012년. 12월

□ 그간 추진상황

[팔복배수지 건설]

○ 실시설계 용역완료(팔복배수지)   ---------------  ‘04. 12. 21

○ 토지 및 지장물 보상(토지 29필지 29,661㎡, 94% / 지장물 22건, 100%)

○ 혁신도시 및 법조타운 계발계획에 따른 배수지 용량 검토로 발주 중지  -- ‘06. 8. 2

○ 팔복배수지 건설 설계용역 추진중    -----  ‘09. 9. 8 ~ ’10. 1

[혁신도시 배수관 포설]

○ 혁신도시 배수관 포설 추진   ----------   ‘09. 9. 2 ~ ’12. 09

- 배수관 포설(L=2,200m , D=350～500㎜) ---- 공정 30%

- 사업비 : 2,879백만원(도급액, 1,477 관급자재액, 1,372 폐기물 30)

□ 문제점 및 대책

[문제점]

○ 혁신도시 사업기간 단축요청(국토해양부) : 당초 2012년 ⇒ 2011년

⇒ 우리시 재정 형평상 미확보 예산(시비 12,809백만원)을 2개년에 거쳐 확보 어려움.

[대  책]

○ 시비 미확보로 인해 배수지건설이 지연될 시 송수관로에서 직접 연결하여 혁신도시내에 생활용수 및 공업용수 공급하고 사업기간 연장

□ 금후계획

[혁신도시 배수관 포설]

○ 공 사 추 진   ------------------------   ‘09. 9월 ～ ’12. 9월

[팔복배수지 건설]

○ 설계용역 추진   -----------------------   ‘09. 9월 ～ ’10. 1월

○ 전문가 설계자문(전주시 설계자문위원회)   --------  ‘10. 2월중

○ 자체설계심의 및 수도사업 인가   ------------------  ‘10. 3월중

○ 공사 및 감리 발주   ------------------------------  ‘10. 4월중

○ 건설 추진   -------------------------   ‘10. 4월 ～ ’12. 12월

※ 2010년 발주 - 배수지건설 및 감리발주(70억원 정도)

상수도 100% 공급사업

○ 상수도 혜택을 받지 못하고, 지하수나 간이상수도를 사용하는 농촌

변방동에 맑고 깨끗한 수돗물을 공급하여 보건위생을 향상시키고

○ 시민 모두에게 고르게 상수도를 제공함으로서 소외된다는 시민의식과

마시는 물에 대한 불편을 해소하고자 함.

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 전지역

○ 사 업 량 : 배수관 포설 152㎞, 가압장 신설 13개소

○ 총사업비 : 18,515백만원

○ 수혜가구 : 128개마을 4,223세대(16,605여명)

○ 사업기간 : 1999년 ~ 2010년

□ 그간 추진상황(95.6%)

○ 사 업 량 : 배수관 포설 145.3km, 가압장 10개소

○ 사 업 비 : 16,608백만원(일반회계 6,870, 특별회계 9,738)

○ 수혜가구 : 124개마을 4,056세대(16,103여명)

□ 금후계획

○ 위    치 : 5개지구(완산구 삼천3동 호동마을, 중노송동 마당재 부근,   평화동 구석구마을, 대성동 사대마을, 효자동 정혜사 부근)

○ 사 업 량 : 배수관포설 4.3km, 가압장 2개소

○ 사 업 비 : 650백만원

○ 수혜가구 : 5개지구 73세대(220여명)

※ 미공급지역 : 삼천3동 독배마을(70세대) - 2010년 제1회추경 확보 추진

긴급누수 복구 및 누수탐사

○ 상수도 시설물에서 발생하는 돌발적인 누수를 효율적으로 긴급복구

함으로써 누수로 인한 예산낭비 억제 및 시민불편 해소

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 전 급수구역 일원(맑은물공급사업 정비구역 제외)

○ 사 업 비 : 380백만원(긴급누수복구 360, 누수탐사 20)

○ 사 업 량 : 누수 복구공사 410개소(긴급누수복구 360, 누수탐사 50)

○ 사업기간 : ‘10. 1월 ~ 12월

□ 그간 추진상황

○ ‘09년도 누수민원처리 : 3,632건

- 도급처리(도로누수) : 800백만원 / 681건

- 자체처리 : 2,951개소(누수수리원 10명)

○ 누수탐사용역 추진 : 225백만원 / 160개소

□ 금후계획

○ 긴급누수복구 추진    --------------------  ꡐ10. 1월 ~ 12월

- 사 업 비 : 360백만원

- 사 업 량 : 360개소 정도

○ 용역탐사 추진    ------------------------- ꡐ10. 2월 ~ 11월

- 용 역 비 : 20백만원(복구비 : 긴급누수 사업비 활용)

- 사 업 량 : 50개소 정도

신속하고 완벽한 상수도 계량기관리

○ 유효만기 계량기의 완벽한 교체를 통해 정확한 사용량을 측정하고

계량기 고장 및 동파의 사전 예방조치 강화로 시민불편을 최소화함

□ 사업개요

○ 사업기간 : ‘10. 1월 ~ 12월

○ 예 산 액 : 313백만원

※ 수도전수 : 201,853전

□ 금후계획

○ 유효만기 계량기 교체

- 대    상 : 19,000개(50㎜이하 18,989, 50㎜초과 11)

※ 유효기간 : 50㎜이하 8년, 50㎜초과 6년

- 추진내용 : 직접교체(7,000개), 맑은물 공급사업(10,000개),

상수도 대행업체 교체(2,000개)

○ 고장 및 동파계량기 교체

- 대    상 : 1,500개 정도

- 추진내용 : 긴급복구반 연중(무휴) 운영(공휴일 1개반 2명근무),

당일 교체

○ 소량사용 계량기 중점관리

- 대    상 : 사용량이 전월 대비 현저히 줄어든 수용가

- 추진방법 : 계량기 성능시험을 통한 불량계량기 색출 교체

○ 상습동파 세대 집중관리

- 대    상 : 240세대(최근 5년내 2회 이상 동파발생)

- 관리방법 : 동절기 사전보온 조치(보온재 충전 및 동파방지 비닐설치),   안내문자 발송 등

수 질 관 리 과  소 관

ꊱ	영유아 보육시설 음용수 무료 수질검사 실시	--	20
ꊲ	깨끗하고 맛있는 수돗물 품질관리 및 검증	--	21
ꊳ	『국가공인 수질검사기관』의 고객서비스 강화	--	22
ꊴ	『안정된 수돗물 생산을 위한』 상수도 취․정수시설 유지관리	--	23

영유아 보육시설 음용수 무료 수질검사 실시

○ 어린이집에서 음용하고 있는 수돗물 및 정수기수 등에 대해 먹는 물 공급부서에서 직접 현장을 점검하고 무료 수질검사 등을 실시, 비위생적인 물을 음용하지 않도록 하여 어린이들의 건강을 보호하고자 함

□ 사업개요

○ 사업기간 : 3년간(2010년～2012년)

○ 대    상 : 보육시설 784개소(어린이집 681, 유치원 103)

○ 수질검사

- 검사항목 : 일반세균 등 17개 항목

- 수 수 료 : 무 료

□ 추진계획

○ 영유아 보유시설 현황 및 수돗물 음용실태 파악

- 각 구청 아동보육팀 현황을 근거로 조사

○ 수질검사반 구성 운영, 현지방문 시료 직접채수

- 보육시설에서 사용하는 정수기수 및 수도꼭지수 등

○ 수질검사결과 통보 및 안전하게 음용하는 방법 등 안내 홍보

- 우리시 수돗물의 우수성 홍보 및 정수기 관리요령 등 교육

□ 기대효과

○ 공인수질검사기관 실험실을 이용, 시민에게 실질적인 혜택 제공

○ 시민이 원하는 행정서비스를 발굴하고 찾아가 소통․해결함으로써 행정 신뢰도 제고

깨끗하고 맛있는 수돗물 품질관리 및 검증

○ 과학적인 생산공급 및 첨단 분석체제로 선진국 수준의 철저한 수질

관리를 통하여 안전한 수돗물 공급

○ 고객과의 소통 및 수돗물 품질검증 등을 통한 상호 신뢰성 제고

□ 사업개요

○ 관련 규정보다 강화한 목표 수질관리 및 수질검사

- 수질검사 확대 : 정수 57개 ⇒ 92개 항목

○ 수돗물의 신뢰성 제고를 위한 다양한 시책 지속 추진

- 수돗물평가 소비자 모니터링, 수돗물 품질인증제 실시 등

□ 그간 추진상황

○ 대성정수장 소독시설 및 정수약품 자동화시스템 구축

○ 수돗물 소비자모니터링제 확대운영 (73명 ⇒ 200명)

○『도내최초』수돗물 품질인증제 추진 (‘07년부터 총 3,310세대)

○ 노후공동주택 수질검사 실시 : 74개소 349세대

○ 수돗물 생산시설(대성정수장) 시민공개 : 3,685명

□ 금후계획

○ 첨단시스템을 활용한 과학적인 수질관리의 효율적인 운영

- 최적정 약품 투입으로 맛있고 안전한 물 공급

○ 목표 수질관리 및 규정보다 강화한 수질검사로 안전한 수돗물 생산

- 탁도 및 잔류염소 수질기준의 절반수준까지 낮춰 생산 공급

- 지오스민, 2-MIB(상수원 조류) 등 이․취미 유발물질 관리강화

○ 수돗물의 안전성, 우수성 홍보 및 소비자모니터링 활성화를 통하여 민관 소통행정의 신뢰성 확보

『국가공인 수질검사기관』의 고객서비스 강화

○ 직접 방문 시료수거 및 수질검사 결과의 휴대전화 문자전송 등

신속․정확한 민원서비스를 강화․시행하여 더욱 많이 찾게 되는

공인 수질검사기관으로 도약

□ 운영현황

○ 국립환경과학원『먹는물 수질검사기관 제33호』지정(‘00. 7. 25)

○ 검사범위 : 먹는물(수돗물 등), 상수원수, 먹는샘물, 각종 지하수

○ 수수료수입 : ‘00년 ~ ‘09년까지 3,069백만원(연평균 3억원정도)

□ 그간 추진상황

○ 환경부주관 공인 수질검사기관 정도관리(AQC) 평가 시행

- 2년 연속 최고점수(100점) 획득으로 우수기관 입증

○ 시․군 방문 홍보 및 수거 등 적극적 마케팅을 통한 수익증대

- 2009년도 352백만원 수질검사 수수료 세외수입

※ 수수료 수입증대를 위한 시․군 방문 직접수거(‘09년 2,057건)

○ 검사기관을 활용한 각종 수질관리 시책추진으로 수돗물에 대한 불신감 및 시민불편 해소

- 도내 최초 수돗물 인증제 시행(2009년 1,510세대)

- 변방지역 지하수 음용세대 무료 수질검사(‘07부터 2,360세대 완료)

□ 금후계획

○ 고객편익을 최우선으로 하는 공인 수질검사기관으로 도약

- 시료 직접수거 및 수질 검사결과의 휴대전화 문자전송 등 시행

○ 검사기관의 능력․위상 제고를 위한 연구 및 선진기법 접목추진

- 공인 수질검사기관 협의체 운영 및 자체 기술 연찬시행 등

○ 영․유아 보육시설 무료 수질검사 등 대민 서비스행정 추가 발굴 시행

『안정된 수돗물 생산을 위한』

상수도 취ㆍ정수시설 유지관리

○ 수돗물 생산의 효율적인 운영을 위하여 시설물의 개량 및 적기보수로

안정적 공급을 추진하고 상수도 사업장의 시민 공개를 적극 추진하여

시민이 즐겨찾는 편안한 상수도 사업장의 환경조성

□ 사업개요

○ 사   업   장 : 17개소 (취수장 5, 정수장 4, 배수지 8)

○ 송․도수관로 : 57㎞ (송수관 26, 도수관 31 )

○ 사   업   비 : 1,095백만원

□ 그간 추진상황

◇ 2009년도 추진실적 : 1,496백만원 / 72건(취ㆍ정수시설 개량정비)

○ 사업장 시설물 개선 : 대성정수장 배수지 개량 등(16건 1,158백만원)

○ 소규모 유지관리 수선 : 팔복․대성정수장 수전설비 보수 등(51건 240백만원)

○ 삼천취수장 및 지곡정수장 시민쉼터 조성 : 5건 98백만원(삼천50, 지곡48)

□ 금후계획

◇ ‘10년도 추진방향 : 공업용수 취․정수시설 및 배수지 개량사업에  주력하고 상수도 사업장의 효율적 정비추진

○ 장기사용 노후설비 시설물 현대화 사업추진 개량   ----  3건 894백만원

- 인후배수지 내부도장 방수공사 등 3건

○ 취․정수시설 소규모 수선 및 유지관리   -----------  18건 120백만원

- 정수장 전동밸브 수선(∅200∼∅800㎜) 등 18건

○ 사업장 시설물 정기점검 및 송․도수관 시설물 점검 등 유지관리 강화

○ 상수도 시설물 내부청소(인후배수지외 4개소 85,896㎡)  ---  81백만원

하  수  과   소 관

ꊱ	하수관거정비 민간투자(BTL) 사업	--	25
ꊲ	하수처리 편입구역 하수관거사업	--	26
ꊳ	중앙처리구역 하수관거 정비사업	--	27
ꊴ	효자처리구역 하수관거 정비사업	--	28
ꊵ	환경사업소 악취방지 사업	--	29
ꊶ	합류식 하수도 월류수(CSOs) 처리시설 설치사업	--	30
	매암지구 마을하수도 정비사업	--	31
	진기지구 마을하수도 정비사업	--	32

하수관거정비 민간투자(BTL) 사업

○ 민간자본 유치로 지역경기를 활성화하고 정화조 폐쇄로 시민부담 경감

○ 오수관거정비로 하천 수질개선 및 불명수를 차단 하수처리비 절감

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 일원(덕진, 아중, 중앙, 화산, 효자처리구역)

○ 사업규모 : 관거정비 L=127㎞(A=6.7㎢), 배수설비 9,241개소

○ 사 업 비 : 107,361백만원 (민간자본)

○ 사업기간 : 2005 ～ 2010(6개년)

※ 수혜가구 : 35,000세대,  105,000명

□ 그간 추진상황(전체공정 100%)

○ 시설사업 기본계획고시(민투법 제8조)  -------------- 2005. 06

○ 업무 위․수탁 협약체결(환경부, 도, 시, 환경관리공단)  ---------- 2005. 06

○ 의무부담 행위 동의안 의결(시의회)   --------------- 2005. 09

○ 민간사업자 사업계획서 평가 및 우선협상대상자 선정   ------ 2005. 10

○ 협상 및 사업시행자 지정【전주아랫물길(주)】 ------- 2006. 04

○ 사업실시계획 승인 및 사업 착수  ----------  2006. 04 ～ 현재

- 전체 하수관거 127㎞, 가정배수설비 9,241개소 완료

□ 금후계획

○ 완료된 하수관거 시설점검ㆍ보완 및 전체공사 완료   ---------- 2010. 01

○ 준공 및 운영성과평가위원회 구성(10인내외)  ---------  2010. 01

○ 성과보증 및 준공  ------------------- 2010. 02 ～ 2010. 05

- 준공성과평가위원회 지적사항 보완 등 최종마무리

○ 운영 및 관리(20년간)  --------------- 2010. 06 ～ 2030. 05

하수처리 편입구역 하수관거사업

○ 전주․삼천 상류지역의 생활하수를 차집 하수처리장에 유입

○ 공공수역 수질오염 방지로 쾌적한 하천 수변 공간제공

○ 농촌동 마을하수도 개량으로 시민 보건위생 증진

□ 사업개요

○ 위    치 : 평화동 장교마을 등 48개 마을

○ 사업규모 : 관거신설 L=76.4㎞, 배수설비 2,045개소(5,300세대)

○ 사 업 비 : 42,632백만원(국비 21,316, 지방비 21,316)

- 기투자 8,477백만원, 2010년 6,556백만원(국비 3,070  기금 766  시비 2,730)

※ 시비 미확보 2,730백만원(추경확보)

○ 사업기간 : 2007 ～ 2011(5개년)

□ 그간 추진상황 - 공정 22%

○ 지방재정 투융자심사완료(행정자치부)   ------------- 2007. 10

○ 실시설계용역 및 행정절차 이행  ------- 2007. 06 ～  2008. 08

○ 4개지구(중복․전주천,평화,중인,박물관지구) 공사착공  ---- 2008. 10

- 전체 L=76.4㎞ 중 L=9.4㎞ 완료(‘09년분 11월 완공)

- 완료구간 : 색장동 은석마을 외 3,  삼천교 ～교도소,

세내교～독배천 합류, 박물관 주변(중복천)일부지역 완료

□ 금후계획

○ 4개지구 년차별 사업추진  --------------------- 2010 ～ 2011

- 2010년 하수관거 L=10.0㎞ 시행

중앙처리구역 하수관거 정비사업

○ 노송천 자연형하천 복원사업 상류 오염원 차단으로 시민에게

생명력 있는 수변공간 제공

○ 하천수, 지하수, 우수등 불명수 감소로 하수처리비 절감

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 중앙, 풍남, 중앙동일원(노송천복원사업 상류지역)

○ 사업규모 : 관거정비 L=27.6㎞, 배수설비 3,302가구

○ 총사업비 : 30,000백만원(국비 15,000,  지방비 15,000)

- 기투자 1,450백만원, 2010년 4,692(국비 2,346  기금472  시비 1,874)

※ 시비 미확보 1,874백만원(추경확보)

○ 사업기간 : 2009 ～ 2012(4개년)

□ 그간 추진상황

○ 지방재정 투융자심사(전라북도)  -------------------- 2008. 10

○ 중기지방재정계획 반영  ---------------------------- 2008. 12

○ 실시설계용역 완료  ------------------------ 2009. 03 ～ 08

○ 행정절차이행(재원협의,설계자문,일상감사등) 완료  ----  2009. 10

○ 공사발주 및 업체선정  ----------------------  2009. 11 ～12

□ 추진계획

○ 공사계약 및 착공   -------------------------------- 2010. 01

- 2010년 하수관거 L=5.0㎞ 시행

○ 잔여구간 년차별 사업추진   ------------------ 2011 ～ 2012

효자처리구역 하수관거 정비사업

○ 새만금 상류지역 목표수질 조기달성과 삼천 수질개선 시급

○ 하수관거 우․오수 분리와 건물 정화조 폐쇄로 시민보건 위생 향상

○ 하천수, 지하수, 우수 등 불명수 감소로 하수처리비 절감

□ 사업개요

○ 위    치 : 효자처리구역(효자동 일원), 하수처리장 주변마을 등

○ 사업규모 : 관거정비 L=25.0㎞

○ 총사업비 : 20,000백만원(국비 10,000,  지방비 10,000)

- 2010년 예산 : 100백만원(시비 49  기금 51)

※ 2010년 신규사업 : 기획재정부 1차심의 2억확보(2차심의 탈락)

○ 사업기간 : 2010 ～ 2013(3개년)

□ 그간 추진상황

○ 지방재정 투융자 심사 완료(전라북도) -------------- 2009. 10

○ 용역과제 심의 완료 ------------------------------  2009. 11

□ 문제점 및 대책

○ 2011년 신규사업 반영을 위해 실시설계비(8억원) 추경예산 확보 용역 추진

⇒ 환경부 의견 : 배분사업 추진을 위해 실시설계 우선 시행

□ 금후계획

○ 실시설계용역 추진(부족예산 추경예산 확보)  ----- 2010. 06  ～ 11

○ 행정절차이행(재원협의,설계자문등) ----  2010. 12 ～ 2011. 01

○ 공사착공 및 완료 -------------------  2011. 02 ～ 2013. 12

환경사업소 악취방지 사업

○ 하수처리장에 적합한 악취방지 시설을 설치하여 인근 주민들의   악취민원 해소

○ 하수처리장이 혐오시설이라는 인식에서 탈피 환경보전 체험   교육장으로 활용

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 송천동2가 환경사업소 내

○ 사업규모 : 생물반응조 덮개(1,2단계) 5,600㎡ 및 악취방지 1식

○ 사 업 비 : 3,587백만원(덮개 1,733 탈취기 752 배관 997 전기 105)

○ 사업기간 : 2008. 10 ~ 2010. 9(3개년)

□ 그간 추진상황

○ 용역완료                      -----------------    2009.  2

○ 덮개시설 및 탈취기 등 착공    -------------   2009. 7 ~ 11

○ 덮개 3차분예산 추가확보(100백만원)  -----------   2009. 12

※ 전체공정 : 65%

□ 금후계획

○ 생물반응조 덮개시설 3차분 계약 및 착공  ---------    2010. 1

○ 덮개시설 및 악취방지설비 조기 완료      ---------    2010. 3

○ 시운전 및 준공                           ---------    2010. 6

합류식 하수도 월류수(CSOs) 처리시설 설치사업

○ 새만금 상류지역의 하수관거 분리사업 지연등에 따른 비점 오염원   에서 발생한 초기우수가 미처리된 상태로 합류식 하수도에 유입   월류되어 수질오염이 가중되는 문제점을 보완하고 새만금 유역   목표수질 조기 달성

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주천 및 삼천 일원

○ 사업규모 : 저류조 2개소(70천㎥), 간이처리시설 7개소(65천㎥)

○ 사 업 비 : 48,000백만원 (국비 24,000 지방비 24,000)

○ 사업기간 : 2009년 ～ 2013년(5개년)

□ 그간 추진상황

○ 협약체결(환경부,전북도,4개시군,환경관리공단)     -----  2009. 8

○ 기본계획 및 타당성조사 용역착공(환경관리공단)   ----  2009. 11

○ 2010년 예산 898백만원(국 561, 도 56, 시 281) 확보  ----  2009. 12

□ 금후계획

○ 기본계획 및 타당성조사 용역완료          ---------   2010. 2

○ 입찰공고 및 계약체결      -----------   2010. 3 ～ 2010. 5    ○ 공사착공                            --------------   2010. 6

○ 공사추진 및 준공            ------------  2010. 6～ 2013. 12

매암지구 마을하수도 정비사업

○ 새만금 상류지역의 하천수질을 조기에 개선하여 만경강 생태계를   복원, 성공적인 새만금사업 추진에 기여하고

○ 농촌마을 하수도 시설개량 및 우･오수 분리사업 추진으로 하수처리   효율을 극대화하여 주민의 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 성덕동 일원(매암외 4개마을)

○ 사업규모 : 하수처리시설 Q= 190톤, 하수관거 L= 8.7㎞

○ 사 업 비 : 5,807백만원 (국비 4,065  시비 1,568  기금 174)

- 현재까지 확보예산 1,268백만원(‘09년 845, ’10년 423)

○ 사업기간 : 2009년 ～ 2012년(4개년)

□ 그간 추진상황

○ 하수도정비기본계획변경 승인(환경부)    ----------   2007. 7

○ 실시 설계용역 완료                    -----------   2009. 9

○ 공공하수도 인가신청 및 재원 협의      ------------   2009. 9

○ 지방재정투융자심사(전라북도) 완료     ----------   2009. 11

○ 인가 및 공사발주(조달청)               ---------   2009. 11

○ 공사착공                               ---------   2009. 12

□ 금후계획

○ 처리장 및 하수관로 공사 추진  --------   2010. 1 ～ 2012. 9

○ 시운전 및 준공           ----------   2012. 10 ～ 2012. 12

진기지구 마을하수도 정비사업

○ 새만금 상류지역의 하천수질을 조기에 개선하여 만경강 생태계를   복원, 성공적인 새만금사업 추진에 기여하고

○ 농촌마을 하수도 시설개량 및 우･오수 분리사업 추진으로 하수처리   효율을 극대화하여 주민의 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 전미동 일원(진기외 3개마을)

○ 사업규모 : 하수처리시설 Q= 70톤, 하수관거 L= 6.0㎞

○ 사 업 비 : 3,295백만원 (국비 2,307  시비 889  기금 99)

- 현재까지 확보예산 122백만원(국비 111, 기금 11)

○ 사업기간 : 2010년 ～ 2013년(4개년)

□ 그간 추진상황

○ 하수도정비기본계획변경 승인(환경부)     --------   2007.  7

○ 지방재정투융자심사(전라북도) 완료      ---------   2008. 10

○ 2010년도 국가예산 신청                 ---------   2009.  3

○ 실시 설계용역 완료                     ----------   2009.  9

○ 공공하수도 인가신청 및 재원협의        ----------   2009. 11

□ 금후계획

○ 공공하수도 설치인가(도지사) 완료     ------------   2010. 2

○ 입찰공고 및 계약체결     ------------   2010. 2 ～ 2010. 6

○ 공사착공 및 준공       ------------     2010. 6 ～ 2013. 6