제282회 전주시의회 제1차정례회

복  지  환  경  위  원  회

2011년도

주요업무보고

맑은물사업소

보  고  순  서

□	일 반 현 황		-------	1
□	부 서 별 주 요 기 능		-------	2
□	기 본 현 황		-------	3
□	주요업무 추진상황		-------	8
	○	수 도 행 정 과	-------	9
	○	급 수 과	-------	12
	○	수 질 관 리 과	-------	21
	○	하 수 과	-------	26

일  반  현  황

□ 기   구 : 4과 13담당(1전산실, 1시험소, 1센터, 17사업장)

																																																								맑은물 사업소
			수도행정과																																					급 수 과																																	수질관리과																				하 수 과
	수도행정							요금							체납징수																						맑은물공급										급수시설											누수방지					계량기관리											수질관리					수질분석						생산관리								하수행정			하 수 시설			하수정비
	전산실							누 수 신고 센 터						계량기시험소								방수리취수장			삼천취수장								원당취수장				전미취수장									상관취수장																							인후배수지		천마배수지			효자배수지			완산배수지		송천배수지				서신배수지					금암배수지			화산배수지				대성정수장	지곡정수장		상관정수장	팔복정수장

□ 정‧현원

부 서 직 급		정 원	현 원
			계	수도행정과	급 수 과	수질관리과	하 수 과
합 계		96	95	24	27	32	12
일반직	소 계	57	57	12	16	17	12
	4급	1
	5급	4	5	2	1	1	1
	6급	13	13	3	4	3	3
	7급	23	31	7	5	13	6
	8~9급	16	8	-	6	-	2
연 구 사		4	3	-	-	3	-
기 능 직		35	35	12	11	12	-

※ 청경 14명,  공무직 21명

부서별 주요기능

과 별	분 장 사 무	비 고
수도행정과	• 맑은물사업소 운영 총괄 • 상수도공기업특별회계 운영 • 공사 및 용역계약, 물품관리 • 상수도사용료 과징업무 전반 • 상수도요금 인상 및 조례 개정 • 검침업무 관리 • 상․하수도급수전 관리 및 수도 단속
급 수 과	• 상수도 전면개량을 통한 맑은물 공급사업 • 상수도 중장기계획 수립․시행 • 비상급수계획 및 대책수립 총괄 • 급수공사, 상수도 증설 및 확장공사 • 간이상수도 유지관리업무 • 누수탐사 및 누수복구업무 및 누수방지대책 수립 • 누수신고센터 운영관리 • 급수중지․개전․폐전에 따른 계량기 관리 • 고장․노후계량기 교체관리 • 계량기시험소 운영관리
수질관리과	• 생활․공업용수 등 원․정수 확보 및 생산 • 광역상수도 수요에 따른 수급조절 및 관리 • 각 사업장 구축물․건물 유지보수 및 안전관리 • 국가공인수질검사기관 적정운영 및 정도관리 • 먹는물 공동시설(약수터) 및 간이상수도 수질검사 • 상수도 원․정수 수질관리 및 보전 • 상수원보호구역 관리
하 수 과	• 하수도공기업특별회계 운영 • 하수도사용료 조정 및 징수관리 • 금강수계관리기금 업무 • 하수관거 정비사업 • 하수관거정비 민간투자(BTL)사업 • 마을하수도 시설 및 유지관리 • 하수처리장 운영관리 및 시설물 유지관리 • 하수도 기본계획 수립

기  본  현  황

□ 급수 인구

총인구	급수인구	보급율 (%)	1일 1인 급수량(ℓ)	급수전	유수율(%)	무수율(%)	비고
646,535명	643,115명	99.47	394	203,495	62.82	37.18

□ 수계별 생산 및 급수구역

구 분			시설용량 (천㎥/일)	급수량 (천㎥/일)	급 수 지 역	급수인구	비율 (%)
총 계			328	292		643,115	100
생활용수	합 계		258	254	33개동	643,115	100
	자체상수도	대 성	40	36	동․서서학, 중화산1, 완산, 효자1일부, 삼천1일부, 평화1.2일부	83,605	13
	광역상수도	전주권	218	218	중앙,풍남,노송, 서신, 삼천1일부. 2. 3, 중화2, 평화1.2일부, 효자1일부.2. 3. 4, 진북, 인후1.2.3, 금암1.2, 덕진, 우아1.2, 호성, 팔복, 송천1.2, 조촌, 동산.	559,510	87
공업 용수	팔복정수장		70	38	팔복동 1, 2산단(18개 업체 공급)

※ 생활용수 급수구역은 생산량 및 수요량에 따라 조절

□ 도․송․배․급수관

〔단위 : ㎞〕

총 연 장	도․송수관	배 수 관	급 수 관	비 고
2,199	57	730	1,412

□ 상수원 보호구역

상수도사업장	보 호 구 역			구역지정일	보호시설
	면적(㎢)	상류(Km)	하류(Km)		안내판	표주
계	27.657				42	132
방수리취수장	0.285	1.0	0.5	72. 5. 5.	7	24
상관수원지	26.655	전유역		24. 6. 9.	10	26
삼천취수장	0.284	2.2 (독배천0.7)	0.3	82. 6.19.	11	42
원당양수장	0.104	1.0	0.1	80. 8. 4.	6	16
전미취수장	0.329	0.5	0.3	67. 8. 5.	8	24

□ 상수원 수계별 『댐』 저수량

수 원	위 치	만수량(천㎥)	관리기관	비 고
계		817,139
상 관 제	완 주 군	2,139	전 주 시	대성수계보충
용 담 댐	진 안 군	815,000	수자원공사	전주권광역

□ 하 수 도

구 분		처리구역 (㎢)	계획연장 (㎞)	시설연장 (㎞)	미시설연장 (㎞)	보급율 (%)	비고
계		54.97	2,392	1,674	718	70.0
합 류 식			566	566	0	100.0
분류식	소 계	54.97	1,826	1,108	718	60.7
	오수관거	-	902	646	256
	우수관거	-	924	462	462

□ 차집관로

하 천 명	연 장 (㎞)	맨 홀 (개)	우수토실 (개소)	환기구 (개소)	여수토실 (개소)
계 (6개노선)	88.9	1,010	251	73	5
전주천 (좌, 우안)	23.5	369	142	37	4
삼 천 (좌, 우안)	15.4	155	45	18
금암천 (좌, 우안)	4.4	82	38	9
아 중 선	12.0	174	16	4
팔복선(공장,생활)	16.9	183	8	5	1
상 관 라 인	10.4	47	2
기 타	6.3

□ 하수․위생처리 시설

구 분	하 수 처 리	위 생 처 리
위 치	덕진구 송천동 2가 1035번지
시설용량	1일 처리능력 ⇨ 403,000㎥ - 1단계 시설 : 113,000㎥ - 2단계 시설 : 190,000㎥ - 3단계 시설 : 100,000㎥	1일 처리능력 ⇨ 290㎘ - 분 뇨 : 30㎘ - 정 화 조 : 260㎘
처리방법	1․2단계 고도처리(CNR)공법 3단계 고도처리(CSBR) 공법	하수 연계처리(1994년부터 시행)

□ 2011년 상수도 공기업 예산

총 규 모 : 57,037백만원

〔단위 : 백만원〕

세 입				세 출
계 : 57,037(100%)				계 : 57,037(100%)
▣ 상수도사업수익 : 54,463(95.5%)				▣ 상수도사업비용 : 46,748(82.0%)
◦ 영업수익 : ․ 급 수 수 익 : ․ 급수공사수익 : ․ 기타영업수익 : ◦ 영업외수익 : ․ 예금수입이자 : ․ 타회계전입금 : ․ 기타영업외수익 :	53,314 50,400 2,519 395 1,149 420 516 213			◦ 인력운영비 : ◦ 운 영 경 비 : ◦ 경 상 이 전 : ◦ 급수 공사비 : ◦ 지급이자 :	6,193 34,154 2,430 2,051 1,920
▣ 자 본 적 수 익 : 574(1.0%)				▣ 자본적 지출 : 10,289(18.0%)
◦ 자본잉여금수익 :	574			◦ 자본투자비 :	5,600
				◦ 부채상환금 :	3,969
				◦ 기타자본적지출 :	150
▣ 예산외 계정 : 2,000(3.5%) (과년도계정)				◦ 예 비 비 :	570

□ 2011년 하수도 공기업 예산

총 규 모 : 44,689백만원

〔단위 : 백만원〕

세 입			세 출
계 : 44,689(100%)			계 : 44,689(100%)
▣ 하수도사업수익 : 17,850(39.9%)			▣ 하수도사업비용 : 9,974(22.3%)
◦ 영 업 수 익 : 16,578			◦ 영 업 비 용 : 9,680
. 하수도사용료수익 : . 기타영업수익 :	16,339 239		. 인력운영비 등	1,524
			. 운영경비 등	414
◦ 영업외 수익 : 1,272
			. 민간위탁대행사업비			7,742
. 수 입 이 자 : . 타회계전입금수익 :	236 1,036		◦ 영업외 비용 : 174
			◦ 특별손실 : 20
			◦ 예 비 비 : 100
▣ 자본적 수익 : 26,599(59.5%)			▣ 자본적 지출 : 34,715(77.7%)
◦ 자본잉여금수익:	26,599		◦ 가동설비자산 :		16,334
․ 타회계건설보조금:	24,099
			◦ 비가동설비자산 :		4,758
․ 공 사 부 담 금 :	2,500		◦ 고정부채상환금 :		710
▣ 예 산 외 계 정 : 240(0.6%) (과년도계정)			◦ 민간자본이전 :		12,703
			◦ 예 비 비 :		210

부서별 주요업무 추진상황

수도행정과  소관

급 수 과  소관

수질관리과  소관

하 수 과  소관

수 도 행 정 과  소 관

ꊱ	-상수도 사용 수용가의 납부편익을 위한- 「고지․납부방법 다양화」로 민원서비스 향상	--	10
ꊲ	-안정재정 확충을 위한- 체납 상수도사용료 징수율 제고	--	11

- 상수도 사용 수용가의 납부편익을 위한 -

『고지․납부방법 다양화』로 민원서비스향상 추진

○ 상․하수도 사용료에 대한 납부 및 고지방법을 다양하게 실시하여

납부편익를 도모하고 맞춤형 행정서비스 제공

□ 현   황

○ OCR 고지서 납부 : 시중은행, 제2금융권 등 납부가능

○ 가상계좌 납부     : 전북은행, 농협

○ 인터넷 전자납부   : 공과금수납기(CD/ATM기)에서 납부가능

⇨ 가상계좌․인터넷전자납부시 실시간 납부조회 가능

○ 자동이체 신청 납부시 상수도요금 1% 할인(5,000원 한도)

□ 추진상황

○ ARS방식 신용카드 납부제 운영 추진 : ’11. 4월 ~ 5월

- 시    행 : ’11. 6. 1. ~

- 사 업 비 : 18,000천원

․ 서버(H/W) 및 단말기 : 8,000천원 ․ 납부시스템(S/W) : 10,000천원       - ARS방식(220-7700)이용, 실시간 이체, SMS문자 전송 서비스 제공

- 6월중 수납실적 : 2,447건 69,851천원

□ 금후계획

○ 신용카드 납부 홍보 : 7,8월 OCR 고지서, 홈페이지 등

○ 이메일 고지 추진  : 전 직원 및 대 시민 홍보 추진

- 시행시기 : ’11. 9월 ~

- 고지방법 홈페이지 배너 설치 및 동주민센터 안내문 제작 배포

- 아파트, 대형 점포 등 다중이용시설 홍보물 게첨

- 안정재정 확충을 위한 -

체납 상수도 사용료 징수율 제고

□ 현   황

○ 2011. 5. 31기준                             (단위 : 천건 /백만원)

구분 년도	조 정 액		징 수 액		체 납 액		징수율 (%)	비고
	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액
계	1,145	24,454	871	22,057	274	2,397	90.2
현년도	1,018	21,781	806	20,611	212	1,170	94.6
과년도	127	2,673	65	1,446	62	1,227	54.1

□ 추진상황

○ 특별징수기간 매 분기별 운영

○ 상수도 사용료 체납자 납부 독려

- 고액․고질 체납자 계고장 방문 및 우편 : 5,467명 1,940백만원

- 체납자의 건물주 재산압류 예고문 발송 :   903명 1,087백만원

- 고액 및 고질 체납수용가 강력 정수조치

․급수중지 231개소, 153백만원(개전 199개소, 112백만원)

□ 문제점 및 대책

○ 다중 집합건물 입주자와 생계형 영세상인 등 다수민원 발생

○ 경기침체로 인한 휴ㆍ폐업, 실직자 증가, 부도 등으로 체납액 증가

⇨ 고액체납자, 영세상인 등 분납 유도 납부 징수

□ 금후계획

○ 체납자에 대한 유형별 분석 후 지속적 계고장 발송 및 전화독려

○ 고액ㆍ고질체납자에 대한 재산압류 및 단수등 지속적인 행정 조치

○ 상습 고액체납자에 대한 특별징수반 편성 - 호별방문 등 집중 독려

급  수  과  소 관

ꊱ	「상수도 전면개량을 통한」맑은물 공급사업	--	13
ꊲ	팔복배수지 건설 및 혁신도시 배수관 포설	--	14
	고지대 급수난 해소 사업(지곡배수지 건설)	--	16
	소규모 배수관 시설 사업	--	17
	긴급누수복구 및 누수탐사	--	18
ꊶ	학교 등 급수설비 개선 지원 사업	--	19
	신속하고 완벽한 상수도 계량기관리	--	20

「상수도 전면개량을 통한」맑은물 공급사업

○ 2014년까지 유수율 85%이상 향상 및 선진화된 급수체계 구축으로

맑고 깨끗한 수돗물을 시민들에게 공급하고자 함

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 전 급수구역 일원

○ 사업규모

- 블록안정화 128개블록, 노후․불용관 전면개량 50개블록

- 통합관리센터 신축(서신배수지내) 및 전산시스템 구축 1식

- 상수도관 매설 703㎞(송․배수관로 279, 급수관로 424) 등

○ 총사업비 : 1,436억원(특별회계 636, 일반회계 400, 융자금 400)

○ 사업기간 : 2009. 3월 ～ 2014. 3월(5개년)

□ 추진상황

○ 공 사 착 공 ………………………………………………  ’09.  3. 24

○ 1차분 준공 (256억원) ……………………………………  ’10.  7. 23

○ 2차분 준공 ( 89억원) ……………………………………  ’10. 12. 28

○ 3차분 추진 (118억원) ……………………………… ’10. 12. ~ ’12. 4.

- 사업량 69km, 사업비 118억원 중 34km 매설완료 (현 공정 45%)

○ 사업설명회 개최 50회 (통장, 일반시민등 1,200여명) ……… ’09. 3. ～ ’11. 5.

․공사 추진상황 : 전체 공정 29%

- 상수도관 매설 : 45개 지역 200㎞ 매설완료

- 통합관리센터 신축(건축물) 완료, 급․배수관로 공사 추진중

□ 금후계획

○ 4차분(사업량 123km, 사업비 187억원) 추진……… ’11. 7. ~ ’12. 9.

○ 시민홍보(주민설명회 등) 지속 실시 …………………… 준공시까지

○ 전체분 준공 ………………………………………………… ’14. 3.

팔복배수지 건설 및 혁신도시 배수관 포설

○ 기존 송수관에서 직접 공급되는 조촌, 팔복, 동산동 지역에 간접  배수방식으로 공급하고,

○ 국가의 지역균형 발전계획에 따른 혁신도시, 법조타운, 장동, 유통단지

및 첨단산업단지 등의 생활용수를 안정적으로 공급하고자 함

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 팔복동･만성동 일원

○ 사업규모

- 배수지 34,500㎥/일(생활용수 30,000㎥, 공업용수 4,500㎥)

- 송․배수관 매설 L=11.4㎞(송수관 5.4㎞, 배수관 6㎞)

○ 총사업비 : 26,305백만원(시비 14,715, 국비 9,315, LH공사 2,275)

- 확보예산 19,927백만원 (시비 10,612, 국비 9,315)

※ 2011년 3,800백만원(국비 3,290, 시비 510)

- 미확보액 : 6,378백만원(시비 4,103, LH공사 2,275)

○ 사업기간 : 2009. 9월 ～ 2012. 12월(4개년)

□ 추진상황

[팔복배수지 건설]  공정률 25%

○ 팔복배수지 건설 설계용역 완료 ----------------------- ’10. 1.

○ 팔복배수지 건설사업 추진 ------------------’10. 6. ~ ’12. 6.

- 송ㆍ배수관 매설 (L=3.9km중 1.4km완료, D=900㎜), 배수지 암발파 중

[혁신도시 배수관 포설]  공정률 66%

○ 혁신도시 배수관 포설 추진 ---------------- ’09. 9. ~ ’12. 9.

- 대로1-16호선 제외하고 매설완료

□ 문 제 점

○ 2012년 12월말까지 혁신도시 상수도공급(농진청 시험포 및 지적공사입주 등)이 필요하나 주간선 진입도로(만성복합단지 진입로 대로1-16호선) 사업지연으로 상수도 시설 불가.

※ 상수도공사 : 최소 도로개설에 따른 토공작업 후 3~4개월 소요

□ 대    책

○ 대로1-16호선 도로개설관련 관계기관 회의결과에 따라 LH에서 2012년 사업추진이 예상되나 반드시 2012년도 상반기 토지보상 실시될 수 있도록 지속적인 건의

○ 생활용수는 완주군 이서배수지 활용 또는 혁신도시 진입로(지방도713호)에 임시관로 매설방안 검토 (추가사업비 4억원 정도)

○ 농업용수는 혁신도시 인접 저수지인 기지제를 이용하는 방안검토 중. (LH, 전주시→한국농어촌공사)

□ 금후계획

○ 혁신도시 및 팔복배수지 송배수관 매설추진  :  ’11. 3 ~ ’11. 12.

○ 팔복배수지 및 진입도로 건설 추진          :  ’11. 3 ~ ’12. 12.

○ 혁신도시 및 팔복배수지 전체사업 준공      :  ’12. 12.

고지대 급수난 해소 사업(지곡배수지 건설)

○ 대성정수장 취수원인 임실오원천 주기적 물 분쟁 등 대성정수장

취수원 불안정으로 취수 중단시 평화동, 서서학동 고지대 지역의      급수불출 해소하고 배수지 건설로 안정적 용수공급 기여하고자함

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 완산구 평화동 2가 산104-4번지 일원

○ 사업규모 : 배수지 건설 V=15,000㎥, 가압장 신설 Q=30,000㎥/일

○ 총사업비 : 13,500백만원(공사 12,000 설계 550, 감리 및 기타 950)

- 2011년 확보예산 : 550백만원(기본 및 실시설계용역비)

○ 사업기간 : 2011. ~ 2013.(3개년)

○ 급수구역 : 평화동, 서서학동, 삼천3동 50,000여 세대

□ 추진상항

○ 송수관로 매설 및 세관갱생 ---------------------  ’05. ~ ’06.

- 우림교~삼천취수장간 관로매설 L=2.9km, D=600mm , 사업비 2,827백만원

- 삼천취수장~지곡정수장간 세관갱생 L=2.6km D=600mm , 사업비 860백만원

○ 중기지방재정계획 수립  --------------------------  ’10.  8.

○ 기본 및 실시설계 용역착수  ----------------------  ’11.  5.

□ 금후계획

○ 기본 및 실시설계용역 완료 ------------------------- ’11. 10.

○ 지곡배수지건설(기존시설물 철거 포함)발주 ---------- ’11. 11.

※ 2011년 1회 추경 : 21억원 확보

○ 지곡배수지건설 착공 ------------------------------- ’11. 12.

○ 지곡배수지건설 준공 -------------------------------- ’13.  3.

소규모 배수관 시설 사업

○ 상수도 100% 공급사업의 일환으로 취락지역과 멀리 동떨어져 있어

상수도 공급혜택을 받지 못하고 지하수나 간이상수도를 음용수로

사용하고 있는 소규모 미급수지역에 상수도를 공급하여 행정신뢰도

제고 및 시민 보건위생 개선

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 일원

○ 사업규모 : 관로매설 L=2.5km, D=16~100mm

○ 총사업비 : 200백만원

○ 사업기간 : 2011. 3월 ~ 11월

□ 추진상황

○ 위    치 : 대성동 내원당마을 외 3개소

○ 사 업 량 : 배수관 포설 1.1km, D=50~100mm

○ 사 업 비 : 115백만원

	상수도 100% 공급사업
가. 사업기간 : 1999 ~ 2010년 (총 12년) 나. 사 업 비 : 약 180억원 (시비) 다. 사 업 량 : 배수관 포설 L=152km, 가압시설 13개소 라. 수혜세대 : 총 128개 마을, 16,605명 상수도 공급완료

○ 수혜가구 : 30세대 (120여명)

□ 금후계획

○ 하반기 소규모 배수관 포설사업 지속 추진

- 위    치 : 서서학동 예그린@부근 외 2개소

- 사 업 량 : L=1.1km, D=80~100mm

- 사 업 비 : 205백만원 (본 예산 집행잔액 85, 추경 확보 120)

- 수혜가구 : 약 70여세대 (250여명)

긴급누수복구 및 누수탐사

○ 상수도 시설물에 대한 돌발적인 누수상황에 긴급 복구 대처

○ 집중적인 누수 탐사로 유수율을 향상시켜 누수손실액 보존

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 전 급수구역 일원(맑은물공급 사업구간 제외)

○ 사업규모 : 누수 복구공사 427개소(긴급누수복구 370, 누수탐사  57)

○ 총사업비 : 400백만원(긴급누수복구 374, 누수탐사 26)

○ 사업기간 : 2011. 3월 ~ 12월

□ 추진상황

○ 상반기 긴급누수복구사업 발주 ………………………  251백만원

- 누수민원 처리 : 1,320건 (자체1,268, 단가업체 52)

(급수불출 494건, 도로누수 198건, 계량기실누수 193건, 앵글밸브교체 등 435건)

○ 누수탐사 용역 발주 …………………………  57개소  26백만원

- 15개소 누수 탐사 및 복구 조치

□ 금후계획

○ 하반기 긴급누수복구사업 발주(223백만원)  ………… ’11. 8월

- 2011년 제1회 추경 100백만원 확보 긴급복구 추진

○ 누수발생 예상구간 누수탐사용역(단가계약) 지속 추진

학교 등 급수설비 개선 지원 사업

○ 시민에게 맑고 깨끗한 양질의 수돗물을 공급하기 위하여 노후된      옥내급수관 개량에 필요한 공사비 일부 지원

□ 사업개요

○ 지원범위 : 배관의 내부가 부식되어 수질기준을 초과하는 경우

○ 지원대상 : 학교, 주거용건물, 사회복지시설, 수급자 주택 등

○ 지원근거 : 전주시 상수도 급수조례 제 39조(급수설비의 관리 책임 등)

○ 지원범위

- 학      교 : 공사비의 70%이하(최대 20백만원)

- 공 동 주 택 : 100세대미만(10백만원), 200세대미만(20백만원), 200세대이상(30백만원)

- 기초수급자 : 전액지원(최대 2백만원)

- 단 독 주 택 : 세대당 최대 30만원 이하(연면적 85㎡이하)

○ 사 업 비 :  150백만원

□ 추진상황

○ 사업계획 수립 및 신청서 접수 …………………… ’11. 2. ~ ’11. 3.

○ 급수설비지원 심의회 개최 및 대상자 선정 ……………  ’11. 4. 15

(단위:천원)

대상	수혜인원	사업내용	총사업비	자부담	지원금액	비고
3개소	6,441명		409,351	365,805	43,546
평화주공2단지	5,400명	급수관 교체	390,000	360,000	30,000
해성중학교	1,014명	〃 세척	5,950	1,785	4,165
엘림은혜의집	27명	〃 교체	13,401	4,020	9,381

※신청자 13개소 중 수질기준(탁도,PH,색도,철,납,구리,아연) 적합판정 10건 제외

○ 공사 추진 및 지원금 지급(2개소, 13,546천원) ……… ’11. 4. ~ ’11. 6.

□ 금후계획

○ 평화주공 2단지 공사추진 및 지원금 지급 ……… ’11. 6. ~ ’11. 8.

○ 하반기 2차 지원사업 시행 ………………………… ’11. 8. ~ ’11. 12.

신속하고 완벽한 상수도 계량기관리

○ 유효만기 계량기의 완벽한 교체를 통해 정확한 사용량을 측정하고

계량기 고장 및 동파의 사전 예방조치 강화로 시민불편을 최소화함

□ 사업개요

○ 사업규모 : 계량기 교체 20,000개

ꠂ 유효만기 18,500개.  고장 및 동파 1,500개

(자체인력 8,500개, 대행업체 2,500개, 맑은물공급사업 9,000개 교체)

○ 총사업비 : 340백만원

○ 사업기간 : 2011. 1월 ~ 12월

□ 추진상황

○ 계량기 교체 추진 …………………………… 10,660개  235백만원

- 유효만기 6,675개   고장 및 동파 3,985개

(자체인력 4,379,  대행업체 1,422,  맑은물공급사업 4,859)

○ 불량계량기 색출을 위한 고장계량기 성능시험 ………… 2,572개

- 구입계량기 1,981,  노후․고장 504,  민원시험 87

□ 금후계획

○ 유효만기 및 고장 계량기 교체 지속 실시 : 9,340개  198백만원

- 2011년 제1회 추경 100백만원 확보 계량기 구입 교체 추진

○ 불량계량기 색출을 위한 계량기 성능시험 지속 실시

○ 동파보온비닐 설치 및 상습동파 세대 집중관리(20백만원) : ’11. 10. ~ ’11. 12.

- 최근 5년내 2회 이상 동파 발생 250세대 집중관리

- 동절기 사전보온 조치(보온재 충전 및 동파방지 비닐설치)등

수 질 관 리 과  소 관

ꊱ	사회복지시설․저소득층 음용수 수질관리	--	22
ꊲ	배수지 내부 개량으로 맑은물 공급추진	--	23
ꊳ	깨끗하고 맛있는 수돗물 품질관리 및 안전성 검증	--	24
ꊴ	전국 최우수 수질검사기관․정수장 위상 강화	--	25

사회복지시설․저소득층 음용수 수질관리

○ ‘폭 넓은 수도행정서비스’가 사회적 약자의 건강보전에 기여할 수 있도록

소외계층의 음용실태 파악 및 무료 수질검사를 시행, 부적절 음용사례 개선

□ 사업개요

○ 사업기간 : ’11. 1. ~ ’11. 12.

○ 사업대상 : 사회복지시설(65개소)

계	보육원	양로시설	요양원	재가노인 복지시설	노 인 복지회관
65	4	2	39	14	6

※ 영유아 보육시설(794개소) : ’10년 ~ ’12년까지 지속 시행 계획

○ 사업내용 : 실태파악 및 무료수질검사를 통한 부적절 음용사례 개선

- 현지조사, 먹는 물 수질기준 검사 (검사수수료 79,700원/건 면제), 개선안 권고

□ 추진상황

○ ‘수돗물 이동상담반’ 현지방문, 시료채수 및 먹는 물에 관한 상담

- 사회복지시설 42개소 점검결과 적합 39, 부적합 3개소 (’11. 6월말 기준)

- 영유아보육시설 ’10~’11.현재 406개소 점검결과 적합 361, 부적합 45

○ 부적합 사례에 대한 원인분석 및 대안을 제시(수돗물 음용 권장)

- 주요 부적합 내용 : 정수기 필터 관리소홀로 일반세균 기준초과

□ 금후계획

○ 시민이 호응하는 실질적인 다양한 시책 발굴로 ‘고마운 수도행정’ 자리매김

- 사회 소외계층, 지하수 음용가구에 대한 무료 수질검사제와 더불어        세대를 방문 현장검사, 불편을 상담하는 수돗물 품질인증제 지속추진

- 수질검사 결과분석 및 안전음용 방법 안내, 기타 시민의견 수렴

○ 대중음식점의 음용수 관리실태 조사를 통한 부적절한 실태 개선 (’11 하반기)

배수지 내부 개량으로 맑은물 공급추진

○ 광역상수도 배수지 내부 부식으로 누수 및 정수장 ~ 수도꼭지의 급수과정     ‘2차 수질오염’이 우려되어 노후시설의 교체 및 내부 도장방수 추진

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2009. ~ 2012.

○ 사 업 명 : 광역상수도 (수수)배수지 내부개량 공사

○ 사업개요 : 3개 배수지 노후시설 교체 및 내부도장, 방수

- 인후(4지 14,454㎡), 천마(4지 14,700㎡), 효자배수지(2지 7,350㎡)

※ 배수지 시설규모 : 인후, 천마 각각 V = 30,000㎥, 효자 15,000㎥

○ 사 업 비 : 2,100백만원(기투자 1,200, 이후투자 900)

□ 추진상황

○ 인후배수지 내부 개량공사 완료(’09.~’10.) -------- 790백만원

- 총 4지 내부 세라믹수지 코팅 및 노후 밸브 등 설비 개선

○ 천마배수지 2지 ’11. 7월 완공예정----------------- 410백만원

- 2011 사업비 부족, 총 4지중 2지에 대하여 내부도장 및 설비 개선

□ 문제점 및 대책

○ 내부 구조물이 에폭시 도장된 전국 상수도 배수지의 공통적인 문제      - 수돗물 소독제인 염소의 영향으로 내부 구조물(철제, 콘크리트) 부식

- 도장제(에폭시)가 벗겨져 수돗물에 용해되어 물의 색상이 변질(청색)

⇨ 잔여 사업물량(배수지)의 조속한 개선을 추진, ‘수돗물 2차 오염’ 방지

□ 금후계획

○ 배수지 잔여물량 2012년도까지 개량 완료 : 총 4지 900백만원

- 천마배수지 2지 7,350㎡, 효자배수지 2지 7,350㎡

깨끗하고 맛있는 수돗물 품질관리 및 안전성 검증

○ 과학적 생산 공급 및 첨단 분석체제로 선진국 수준의 철저한 수질관리

○ 시민 소비자와의 소통을 통한 품질검증으로 수돗물의 상호 신뢰성 향상

□ 사업개요

○ 규정보다 강화한 수질관리 및 검사체제를 목표로 설정․운영

- 검사항목(정수 57개 ⇒ 95개 항목) 및 검사주기, 대상 등 확대

○ 수돗물 신뢰성 향상을 위한 다양한 시책의 지속적 발굴, 추진

- 시민 모니터링, 품질인증제, 시민참여 수질조사 등 ‘소통형’ 프로그램 개발

□ 추진상황

○ 수도행정 평가 및 제안 수렴을 위한 소비자 모니터단 구성, 운영

- 점진적인 규모, 역할 확대 (’08, 73명 ⇒ ’09, 200명 ⇒ ’11, 1,000명)      - 수돗물 음용 캠페인, 용담호 상수원 정화 등 ‘시민주도’ 계도활동 전개

○ 수돗물 품질인증제 추진 : ’11 상반기 720개소 완료, 6,000세대/ ’07~현재

※세대방문, 수질검사 및 불편상담을 통하여 수돗물 안전성 홍보 주력

○ 상수도 생산시설 견학 및 현장체험 : ’11 상반기 2,155명, 3,600명/년 평균

□ 금후계획

○ 분석 및 수처리 전문인력과 첨단장비를 활용, 과학적 수처리 공정 운영

- 적정 약품투입, 선진 처리공정으로 안전성은 물론 맛있는 수돗물 생산

○ 하절기 시민건강 증진을 위한 완벽한 정수처리 및 수질분석체계 운영

- 장마철 호우영향, 상수원 상류지역 오염원 유입 등에 철저한 대처

- 수인성 전염병 예방을 위한 안전한 ′수돗물 마시기’ 사회의식 확산 추진

○ 수돗물 불편사항 모니터링 및 수도행정 평가, 정책제안 등에 시민참여율을 높여 ′시민의 바람직한 뜻’이 반영되는 수도행정 구축

전국 최우수 수질검사기관․정수장 위상 강화

○ 환경부 평가 “4년 연속 만점 수질검사기관” 위상 지속적 유지

- ’08 전국 정수장 운영능력 평가결과 최우수정수장 선정에 걸맞는     최상의 상수도 생산․공급능력을 충분하게 발휘, 위상의 지속적 강화

□ 사업개요

○ 사업내용(목표성과)

- ’11년도 환경부 공인검사기관․ 정수장 평가 우수한 성적 거양

- 검사기관을 활용한 다양한 시책 추진으로 수돗물 신뢰도 향상에 기여

	공인수질검사기관 운영현황
․ 국립환경과학원『먹는물 수질검사기관 제33호』지정 - ′00.7.25 ․ 검 사 범 위 : 모든 먹는물, 상수원수, 먹는샘물, 각종 지하수 등 ․ 수수료 수입 : ′00년 ~ ′10년 3,385백만원(연평균 3억원정도)

□ 추진상황

○ ’08~’11 국립환경과학원 평가결과 ‘4년 연속 만점기관’ 선정

- ’11년도 분석능력 평가 결과 발표(’11. 6. 3)

○ 환경부 전국 정수장평가 ’2008년도 최우수 정수장’ 선정

⇨ 수돗물의 신뢰성 제고 기여 및 타 시 ․ 군  업무연찬(수처리공정) 지원

- 검사기관을 활용한 다양한 시책 추진으로 수돗물 신뢰도 향상 기여

※ Water Korea 먹는물 수질개선 연구성과 발표 : ’10. 12. 환경부장관상 수상

□ 금후계획

○ 수질검사 유치 강화 : 공격적 마케팅 및 “고객중심”운영 중점추진

- 시료 직접수거, 검사결과 휴대전화 문자전송 등 고객편의성 주안

- 먹는 물 관리 상담, 검사기일 단축(1/2), 분석결과의 정확성 등 부각

○ 정수장 선진화 완성 : 완벽한 수처리공정(시설) 구축 및 노후환경 개선

하  수  과   소 관

ꊱ	하수처리 편입구역 하수관거사업	--	27
ꊲ	중앙처리구역 하수관거 정비사업	--	28
ꊳ	효자처리구역 하수관거 정비사업	--	29
ꊴ	합류식 하수도 초기우수(CSOs) 처리시설 사업	--	30
ꊵ	전주하수처리장 총인처리시설 설치사업	--	31
ꊶ	매암지구 마을하수도 정비사업	--	32

하수처리 편입구역 하수관거사업

○ 전주․삼천 상류지역의 생활하수를 차집 하수처리장에 유입

○ 공공수역 수질오염 방지로 쾌적한 하천 수변 공간제공

○ 농촌동 마을하수도 개량으로 시민 보건위생 증진

□ 사업개요

○ 위    치 : 평화동 장교마을 등 48개 마을

○ 사업규모 : 관거신설 L=76.4㎞, 배수설비 2,045개소(5,300세대)

○ 총사업비 : 39,844백만원(국 19,790, 시 17,046, 기금 3,008)

- 기   투   자 : 12,295백만원(국 7,511, 시 3,462, 기금 1,322)

- 2011년 예산 : 7,666백만원(국 4,183, 시 2,812, 기금 671)

○ 사업기간 : 2008년 ～ 2013년(6개년)

□ 추진상황

○ 지방재정 투융자심사 완료(행정자치부)  ---------   2007. 10.

○ 실시설계용역 및 행정절차 이행  -----  2007. 6. ~ 2008. 8.

○ 4개지구(중복․전주천,평화,중인,박물관지구) 공사착공  --  2008. 10.

- 전체 L=76.4㎞ 중 L=30.7㎞ 완료(전체 공정: 40%)

- 완료구간 : 색장동 은석마을 외 9,  삼천교 ～교도소,

세내교～ 중인교, 박물관 주변(중복천)일부지역 완료

□ 금후계획

○ 2011년 잔여사업 추진 완료  --------------   2011. 12.

- 하수관거 L=3.0㎞, 배수설비 150개소(평화․삼천동 일원)

○ 잔여구간 사업 추진  --------------------   2013년 완료 예정

중앙처리구역 하수관거 정비사업

○ 노송천 자연형하천 복원사업 상류 오염원 차단으로 시민에게

생명력 있는 수변공간 제공

○ 하천수, 지하수, 우수등 불명수 감소로 하수처리비 절감

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 중앙, 풍남, 노송동일원(노송천복원사업 상류지역)

○ 사업규모 : 관거정비 L=27.6㎞, 배수설비 3,302가구

○ 총사업비 : 30,000백만원(국 15,000, 시 12,750, 기금 2,250)

- 기   투   자 : 7,097백만원(국 2,720, 시 4,002, 기금 375)

- 2011년 예산 : 3,545백만원(국 1,725 시 1,193, 기금 627)

○ 사업기간 : 2010년 ～ 2013년(4개년)

□ 추진상황

○ 지방재정 투융자심사(전라북도)  -----------------  2008. 10.

○ 중기지방재정계획 반영  -------------------------  2008. 12.

○ 실시설계용역 완료  ------------------------  2009. 3. ～ 8.

○ 행정절차이행(재원협의, 설계자문, 일상감사등) 완료 ---  2009. 10.

○ 공사발주 및 업체선정  -------------------  2009. 11. ~ 12.

○ 공사계약 및 착공(전체공정 : 23%)  -------------  2010.  1.

- 동양@사거리 ~ 중앙시장아케이트 ~ 시청 앞 관로매설 완료

□ 금후계획

○ 2011년 잔여사업 추진 완료  --------------   2011. 12.

- 하수관거 L=2.0㎞, 배수설비 313개소(동문사거리 및 경원동 주변)

○ 잔여구간 사업 추진  ---------------------  2013년 완료 예정

효자처리구역 하수관거 정비사업

○ 새만금 상류지역 목표수질 조기달성과 삼천 수질개선 시급

○ 하수관거 우․오수 분리와 건물 정화조 폐쇄로 시민보건 위생 향상

○ 하천수, 지하수, 우수 등 불명수 감소로 하수처리비 절감

□ 사업개요

○ 위    치 : 효자처리구역(효자동 일원), 하수처리장 주변마을 등

○ 사업규모 : 관거정비 L=25.0㎞

○ 총사업비 : 20,000백만원(국 10,000, 시 8,500, 기금 1,500)

- 기   투   자 : 49백만원

- 2011년 예산 : 1,000백만원(국 500, 시 455, 기금 45)

○ 사업기간 : 2012년 ～ 2014년(3개년)

□ 추진상황

○ 지방재정투융자 심사 완료(전라북도)  ------------  2009. 10.

○ 용역과제 심의 완료  ----------------------------  2009. 11.

○ 계약(원가) 심사(전라북도)  ---------------------  2010. 12.

○ 실시설계용역 착공  -----------------------------  2011.  2.

○ 기초자료 수집 및 현지조사 측량 -----------------  2011.  6.

□ 금후계획

○ 실시설계용역 완료  -----------------------------  2011. 12.

○ 설계자문 및 재원협의  ------------  2011. 12. ~ 2012.  1.

○ 공사착공 및 완료  ----------------  2012.  2. ~ 2014. 12.

합류식 하수도 초기우수(CSOs) 처리시설 사업

○ 새만금 상류지역의 비점 오염원에서 발생한 초기우수의 수질오염을

근원적으로 차단하여 새만금 유역 수질개선

□ 사업개요

○ 위    치 : 송천동 환경사업소내 및 효자동 마전교 상류 고수부지

○ 사업규모 : 저류조 2개소(13만톤), 간이처리시설 3개소

○ 사 업 비 : 69,698백만원(국비 34,849 도비 7,000 시비 27,009, 기금840)

- 기   투   자 :  898백만원(국비   561 도비  56, 시비 281)

- 2011년 예산 : 5,376백만원(국비 2,688 도비 538, 시비 1,310, 기금 840)

○ 사업기간 : 2009년 ～ 2013년(5개년)

○ 사업 추진방법 : 환경부, 전북도, 전주시, 익산시, 김제시, 완주군,   한국환경공단 협약체결 추진

□ 추진상황

○ 협약체결(환경부, 전북도, 4개시군, 환경관리공단)  ---  ’09. 8.

○ 종합계획수립 및 타당성조사 용역 완료  ------------  ’10. 2.

○ 기본계획 및 입찰안내서 용역 완료  ----------------  ’10. 7.

○ 시설공사 입찰공고  ------------------------   ’10. 8. ~ ’12.

○ 실시설계 적격자 선정 및 우선시공분 계약  --------  ’10. 12.

□ 문제점 및 대책

○ 전주시 지방비 부담률(50%)이 타 시군(익산, 김제 30%)에 비해

높아 재원부족으로 사업추진 지난

⇨ 국, 도비 지원률 70% 상향조정 요구(국비 50%⇒ 60%)

※ 도비(5%⇒ 10%) 기 결정, 국비 부담률(법령 개정) 조정요구

□ 금후계획

○ 실시설계 시행 및 재원협의(환경부)  -------   ’11. 1. ～  ’11. 7.

○ 공사착공 및 완료   ---------------------   ’11. 4. ～ ’13. 11.

- 2011년 우선시공분 추진(전주환경사업소 저류조 10만톤)

전주하수처리장 총인처리시설 설치사업

○ 새만금 상류지역은 방류수 수질기준이 2012.1.1일부터 총인(T-P)

2.0 ⇨ 0.2mg/L이하로 강화되어  “총인” 처리시설 설치 필요

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 송천동 환경사업소내

○ 사업규모 : 403천㎥/일, 총인(T-P) 2.0 ⇨ 0.2mg/L 이하

○ 사 업 비 : 24,144백만원(국비12,072, 도비4,529, 시비6,932, 기금311)

- 운영비 2,500백만원/년

- 기   투   자 : 157백만원(국비 102, 시비 55)

- 2011년 예산 : 4,072백만원(국비 2,508, 도비 235, 시비 1,018, 기금 311)

○ 사업기간 : 2010년 ～ 2012년

□ 추진상황

○ 새만금유역 총인처리 시설비 및 운영비 전액국비로 추진계획 수립

(국무총리실 수질개선기획단, 환경부)  -----------   ’08. 12.

○ 환경부에서 새만금 환경분과 대책위원회에 인처리설비 도입방안 보고

(전액 국비설치)  -------------------------------   ’09.  4.

○ 4대강사업 총인처리 국비지원 비율과 동일하게 국비 50%, 지방비

50%로 변경  -----------------------------------  ’09. 10.

○ 지방재정투융자 조건부 심사(도비비율 협의후 추진)  ----  ’10. 10.

○ 용역과제 심의(시 기획예산과)  ------------------  ’10. 11.

○ 용역원가 심사(전북도 예산과)  ------------------  ’10. 11.

○ 기본 및 실시설계 용역발주  ----------------------  ’10. 12.

○ 부시장․부군수회의시 도비비율 통보  ------------  ’10. 12.

※ 전북도 2011년 도비비율 20% 조정 확정

□ 금후계획

○ 기본 및 실시설계 추진  ---------------  ’11. 1. ~ ’11. 11.

○ 공사발주(조달청)  -------------------------------   ’11. 12.

○ 공사착공 및 완료  --------------------   ’12. 3. ~ ’12. 12.

매암지구 마을하수도 정비사업

○ 새만금 상류지역의 하천수질을 개선하고자 농촌마을하수도 시설개량

및 우․오수 분리사업을 추진 악취발생 해소 및 주민 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 성덕동 일원(매암 외 4개마을)

○ 사업규모 : 하수처리시설 Q= 190톤, 하수관거 L= 8.7㎞

○ 총사업비 : 4,989백만원(국 3,492, 시 1,432, 기금 65)

- 기 투 자 : 1,540백만원(국 1,031, 시 509)

- 2011년 예산 : 801백만원(국 736, 시 0, 기 65)

○ 사업기간 : 2009년 ～ 2013년

□ 추진상황

○ 실시설계 완료                            : ’09.  9.

○ 인가 및 공사발주(조달청)                 : ’09. 11.

○ 처리장 예정지 토지수용(재결 및 공탁)      : ’10. 10. ~ ’11. 2.

○ 1차 ~ 3차분 공사(하수관거 L=3.05km) 완료   : ’10.  6. ~ ’11. 4.

○ 4차분 공사 착공                          : ’11. 6. 3.

□ 금후계획

○ 4차분 사업(처리장 190톤) 공사 추진 -------------  2011. 6. ~  10.

○ 잔여 공사추진  ----------------------  2012. 1. ~ 2013. 12.