제286회 전주시의회 임시회

복  지  환  경  위  원  회

2012년도

주요업무계획

맑은물사업소

https://jwater.jeonju.go.kr

보  고  순  서

□	일 반 현 황		-------	1
□	부 서 별 주 요 기 능		-------	2
□	기 본 현 황		-------	3~7
□	주요업무 추진상황		-------	8~35
	○	수 도 행 정 과	-------	9~10
	○	급 수 과	-------	11~21
	○	수 질 관 리 과	-------	22~26
	○	하 수 과	-------	27~35

일  반  현  황

□ 기   구 : 4과 13담당(1전산실, 1센터, 1시험소, 17사업장)

																																																							맑은물 사업소
		수도행정과																																					급 수 과																																수질관리과																				하 수 과
수도행정							요금							체납징수																					맑은물공급											급수시설											누수방지			계량기관리												수질관리					수질분석						생산관리								하수행정			하 수 시설			하수정비
전산실																				누수신고센터												계량기시험소													방수리 취 수 장							삼천취수장					원당취수장		전미취수장		상관취수장						인후배수지		천마배수지			효자배수지			완산배수지		송천배수지				서신배수지					금암배수지			화산배수지				대성정수장	지곡정수장		상관정수장	팔복정수장

□ 정‧현원

부 서 직 급		정 원	현 원
			계	수도행정과	급 수 과	수질관리과	하 수 과
합 계		94	91	21	26	32	12
일반직	소 계	56	54	11	16	16	11
	4급	1
	5급	4	4	1	1	1	1
	6급	13	13	3	4	3	3
	7급	23	27	6	5	12	4
	8급	9	5	1	2	-	2
	9급	6	5	-	4	-	1
연 구 사		4	3	-	-	3	-
기 능 직		34	34	10	10	13	1

※ 청경 14명,  공무직 20명(출산휴가 1, 육아휴직 1 포함)

부서별 주요기능

과 별	분 장 사 무	비 고
수도행정과	• 맑은물사업소 운영 총괄 • 상수도공기업특별회계 운영 • 공사 및 용역계약, 물품관리 • 상․하수도사용료 과징업무 전반 • 상수도요금 인상 및 조례 개정 • 검침업무 관리 • 상․하수도 급수전 관리 및 수도 단속
급 수 과	• 상수도 전면개량을 통한 맑은물 공급사업 • 상수도 중장기계획 수립․시행 • 비상급수계획 및 대책수립 총괄 • 급수공사, 상수도 증설 및 확장공사 • 간이상수도 유지관리업무 • 누수탐사 및 누수복구업무 및 누수방지대책 수립 • 누수신고센터 운영관리 • 급수중지․개전․폐전에 따른 계량기 관리 • 고장․노후계량기 교체관리 • 계량기시험소 운영관리
수질관리과	• 생활․공업용수 등 원․정수 확보 및 생산 • 광역상수도 수요에 따른 수급조절 및 관리 • 각 사업장 구축물․건물 유지보수 및 안전관리 • 국가공인수질검사기관 적정운영 및 정도관리 • 먹는물 공동시설(약수터) 및 간이상수도 수질검사 • 상수도 원․정수 수질관리 및 보전 • 상수원보호구역 관리
하 수 과	• 하수도공기업특별회계 운영 • 하수도사용료 조정 및 징수관리 • 금강수계관리기금 업무 • 하수관거 정비사업 • 하수관거정비 민간투자(BTL)사업 • 마을하수도 시설 및 유지관리 • 하수처리장 운영관리 및 시설물 유지관리 • 하수도 기본계획 수립

기  본  현  황

□ 급수 인구

총인구	급수인구	보급율 (%)	1일 1인 급수량(ℓ)	급수전	유수율(%)	무수율(%)	비고
651,015	648,410명	99.6	395	211,486	62.82	37.18

□ 수계별 생산 및 급수구역

구 분			시설용량 (천㎥/일)	급수량 (천㎥/일)	급 수 지 역	급수인구	비율 (%)
총 계			328	292		648,410	100
생활용수	합 계		258	254	33개동	648,410	100
	자체상수도	대 성	40	25	서서학동 일부, 중화산1 일부, 완산동 일부, 효자1일부, 평화1.2일부	63,291	9.7
	광역상수도	전주권	218	229	중앙,풍남,노송, 서신, 동서학동, 서서학동 일부, 삼천1. 2. 3, 중화1일부,중화2, 평화1.2일부, 효자1일부.2. 3. 4, 진북, 인후1.2.3, 금암1.2, 덕진, 우아1.2, 호성, 팔복, 송천1.2, 조촌, 동산	585,119	90.3
공업 용수	팔복정수장		70	38	팔복동 1, 2산단(17개 업체 공급)

※ 생활용수 급수구역은 생산량 및 수요량에 따라 조절

□ 도․송․배․급수관·

〔단위 : ㎞〕

총 연 장	도․송수관	배 수 관	급 수 관	비 고
2,199	57	730	1,412

□ 상수원 보호구역

상수도사업장	보 호 구 역			구역지정일	보호시설
	면적(㎢)	상류(Km)	하류(Km)		안내판	표주
계	27.657				43	133
방수리취수장	0.285	1.0	0.5	72. 5. 5.	8	26
상관수원지	26.655	전유역		24. 6. 9.	10	26
삼천취수장	0.284	2.2 (독배천0.7)	0.3	82. 6.19.	11	42
원당양수장	0.104	1.0	0.1	80. 8. 2.	6	15
전미취수장	0.329	0.5	0.3	67. 8. 5.	8	24

□ 상수원 수계별 『댐』 저수량

수 원	위 치	만수량(천㎥)	관리기관	비 고
계		817,139
상 관 제	완 주 군	2,139	전 주 시	대성수계보충
용 담 댐	진 안 군	815,000	수자원공사	전주권광역

□ 하 수 도

구 분		처리구역 (㎢)	계획연장 (㎞)	시설연장 (㎞)	미시설연장 (㎞)	보급율 (%)	비고
계		54.97	2,392	1,680	712	70.0
합 류 식			566	566	0	100.0
분류식	소 계	54.97	1,826	1,114	712	61.0
	오수관거	-	902	650	252
	우수관거	-	924	464	460

□ 차집관로

하 천 명	연 장 (㎞)	맨 홀 (개)	우수토실 (개소)	환기구 (개소)	여수토실 (개소)
계 (6개노선)	88.9	1,010	251	73	5
전주천 (좌, 우안)	23.5	369	142	37	4
삼 천 (좌, 우안)	15.4	155	45	18
금암천 (좌, 우안)	4.4	82	38	9
아 중 선	12.0	174	16	4
팔복선(공장,생활)	16.9	183	8	5	1
상 관 라 인	10.4	47	2
기 타	6.3

□ 하수․위생처리 시설

구 분	하 수 처 리	위 생 처 리
위 치	덕진구 송천동 2가 1035번지
시설용량	1일 처리능력 ⇨ 403,000㎥ - 1단계 시설 : 113,000㎥ - 2단계 시설 : 190,000㎥ - 3단계 시설 : 100,000㎥	1일 처리능력 ⇨ 290㎘ - 분 뇨 : 30㎘ - 정 화 조 : 260㎘
처리방법	1․2단계 고도처리(CNR)공법 3단계 고도처리(CSBR) 공법	하수 연계처리(1994년부터 시행)

□ 2012년 상수도 공기업 예산

총 규 모 : 83,629백만원

〔단위 : 백만원〕

세 입			세 출
계 : 83,629(100%)			계 : 83,629(100%)
▣ 상수도사업수익 : 68,424(81.8%)			▣ 상수도사업비용 : 48,532(58%)
◦ 영업수익 : ․ 급 수 수 익 : ․ 급수공사수익 : ․ 기타급수수익 : ․ 기타영업수익 : ◦ 영업외수익 : ․ 예금수입이자 : ․ 타회계전입금 : ․ 기타영업외수익 :	66,690 63,388 2,850 132 320 1,734 600 890 244		◦ 영 업 비 용 : 46,643 ․ 인력운영비 : 6,367 ․ 운 영 경 비 : 34,551 ․ 경 상 이 전 : 3,522 ․ 급수 공사비 : 2,203 ◦ 영업 외 비 용 : 1,889
▣ 자본적수익 : 12,880(15.4%)			▣ 자본적지출 : 35,097(42%)
◦ 비유동부채수입 : 12,200			◦ 자본투자비 :	30,329
◦ 자본잉여금수익 : 680			◦ 부채상환금 :	3,670
			◦ 기타자본적지출 :	251
▣ 예산외계정 : 2,325(2.8%) (과년도계정)			◦ 예 비 비 :	847

□ 2012년 하수도 공기업 예산

총 규 모 : 85,760백만원

〔단위 : 백만원〕

세 입			세 출
계 : 85,760(100%)			계 : 85,760(100%)
▣ 하수도사업수익 : 30,966(36.1%)			▣ 하수도사업비용 : 18,881(22.0%)
◦ 영 업 수 익 : 29,864			◦ 영 업 비 용 : 18,351
. 하수도사용료수익 : . 기타 영업수익 :	29,598 266		. 인력운영비 등 : 1,590 . 운영경비 등 : 1,143 . 민간위탁대행사업비 : 15,618
◦ 영업외 수익 : 1,102
. 수 입 이 자 : . 타회계전입금수익 :	102 1,000		◦ 영업외 비용 : 390
			◦ 특 별 손 실 : 15
			◦ 예 비 비 : 125
▣ 자본적수익 : 54,254(63.3%)			▣ 자본적지출 : 66,879(78.0%)
◦ 비유동부채수입:	10,000		◦ 가동설비자산 :	26,284
◦ 자본잉여금수익:	44,254
․ 타회계건설보조금:	40,754
			◦ 비가동설비자산 :	18,793
․ 공 사 부 담 금 :	3,500
▣ 예산외계정 : 540(0.6%) (과년도계정)			◦ 민간자본이전 :	21,402
			◦ 예 비 비 :	400

부서별 주요업무 추진 계획

수도행정과  소관

급 수 과  소관

수질관리과  소관

하 수 과  소관

수 도 행 정 과  소 관

ꊱ	-특별회계 재정 건전성 확보를 위한- 누수 없는 상하수도 요금 부과 행정 구현	--	10
ꊲ	-안정재정 확충 실현을 위한- 체납 상수도사용료 징수율 제고	--	11

-특별회계 재정 건전성 확보를 위한-

누수 없는 상하수도 요금 부과 행정 구현

검침현장 및 부과자료의 철저한 관리로 누수 없는 부과체계를 정립하여 탄탄한 특별회계 재정기반 구축은 물론, 시민편익시책을 확대 시행하고 민원응대 친절도를 강화하여 시민에게 신뢰받는 수도행정 구현

□ 급수수익 현황

구 분	2011년 조정액	2012년 (예상)		검 침 원
		조정액	증가
합 계	780억	965억	185억	180명 ◉ 일반주택 86명 ◉ 공동주택 94명
상수도	571억	670억	99억
하수도	209억	295억	86억

※ 매월 205천건 검침 후 상․하수도, 음식물처리수수료 포함 납부 고지

□ 추진계획

○ 수용가 기본 자료 정비 : 공동주택 14만 가구 수용가명

○ 검침원 교육 강화 : 매월 교육 실시로 검침 철저 및 공직 의식 제고

○ 상하수도 계량기 현장 정기 점검

- 다량 수용가 분기별 점검, 0톤 수용가 현장 점검 강화(가정용 6개월, 일반용 3개월)

- 지하수 사용 계량기 상태 매월 점검

○ 부정급수 단속 : 신축․개축 건물 급수신청여부 현장 단속

○ 민원편익시책 추진

- 이메일 전자고지 시행, 신용카드 결재사 추가(신한카드)

○ 민원 친절도 강화

- 신속한 전화응대 : 전화상담요원 추가확보(기간제 2, 자원봉사자 1)

- 친절교육 매월 실시 : 208명 (직원 11, 검침원 180, 공익요원 외 16)

○ 시정홍보 등 : 홈페이지, 고지서 뒷면 게재 및 전면 QR코드 삽입

- 수돗물 안전, 수돗물 절약, 당면 시정 현안, 기타

□ 기대효과

○ 안정적 재정기반 구축 및 정성을 다하는 부과행정으로 시민의 신뢰 제고

- 안정재정 확충을 위한 -

체납 상 ․ 하수도 사용료 징수율 제고

□ 현   황

○ 2011. 12월말 기준                             (단위 : 백만원)

구분 년도		조 정 액	징 수 액	체 납 액	징수율 (%)
계		59,779	57,586	2,193	96.3
상수도	현 년 도	57,106	55,578	1,528	97.3
	과 년 도	2,673	2,008	665	75.1
계		21,702	20,753	949	95.6
하수도	현 년 도	21,040	20,302	738	96.5
	과 년 도	662	451	211	68.1

□ 그간 추진상황

○ 상하수도사용료 특별징수기간 운영 : 4회

○ 상하수도 사용료 체납자 납부 독려 적극 추진

- 계고장 방문 및 우편 고지 : 13,914명 4,980백만원

- 건물주 재산압류 예고문 발송 : 939명 1,358백만원

- 고액 및 고질 체납수용가 단수 조치

․단수 580개소, 397백만원 (개전 521개소, 305백만원)

□ 문제점 및 대책

○ 신․구 수용가간 이사 후 요금 미 정산으로 체납요금 납부 반발

○ 다중 집합건물 입주자와 생계형 영세상인 등의 체납액 발생

○ 물은 일상생활에 밀접한 관계로 단수 시 강력 반발

⇨ 고액체납자, 영세상인 등 분납 유도 징수

□ 금후계획

○ 맞벌이 등으로 낮 시간에 만날 수 없는 고질체납자 월 1회 이상 야간 징수독려 및 야간 단수로 체납액 최소화

○ 특별징수반 운영 고액ㆍ고질체납자 재산압류, 단수 등 행정조치 지속추진

○ 자동이체납부, 가상계좌, 인터넷뱅킹, 신용카드납부홍보로 징수율제고

급 수 과 소 관

ꊱ	상수도 전면개량을 통한 맑은 물 공급사업	--	13
ꊲ	팔복배수지 건설 및 혁신도시 배수관 포설	--	14～15
	전주권광역상수도수수사업 지곡배수지 건설	--	16
	소규모 배수관 포설 사업	--	17
	노후관 교체․갱생 및 통합공사	--	18
	긴급누수복구 및 누수탐사	--	19
	학교 등 맑은 수돗물 공급사업	--	20
	품질향상을 위한 완벽한 상수도 계량기관리	--	21

상수도 전면개량을 통한 맑은 물 공급사업

○ 2014년까지 유수율 85%이상 향상 및 선진화된 급수체계 구축으로

맑고 깨끗한 수돗물을 시민들에게 공급하고자 함

□ 사업개요

○ 사업기간 : ‘09. 3. ～ ’14. 3.(5개년)

○ 위    치 : 전주시 전 급수구역 일원

○ 총사업비 : 1,436억원(특별회계 517, 일반회계 400, 지방채519)

- 기투자액 : 890억원(2012년  174억원)

○ 사업규모

- 블록안정화 128개 블록, 노후․불용관 전면개량 50개 블록

- 통합관리센터 신축(서신배수지내) 및 전산시스템 구축 1식

- 상수도관 매설 703㎞(송․배수관로 279, 급수관로 424), 노후계량기 교체 40,201전

□ 그간 추진상황

○ 공 사 착 공 ------------------------------------- ‘09. 3. 24

○ 1차분 준공(256억 125.5km) ------------------ ‘10. 7. 23

○ 2차분 준공( 89억  33.9km) ----------------- ‘10. 12. 31

○ 3차분 착공(118억  72.4km) ---------------- ‘10. 1 ~ ’12. 4

○ 4차분 착공(187억  85.4km) ---------------- ‘11. 9 ~ ’12. 9

○ 사업설명회 개최 62회(통장, 일반시민 등 1,701여명) --- ‘09. 3~‘11. 12

▸공사 추진상황 :  전체공정 40% (3차분 97.5%, 4차분 49.3%)

- 상수도관 매설 : 45개 지역  280.7㎞ 매설완료

- 통합관리센터 신축 완료, 급․배수관로 공사 추진중

□ 추진일정

○ 시민홍보(주민설명회 등) 지속 실시 --------------------- 연 중

○ 5차분 발주 ------------------------------------------ ‘12. 3

○ 3차분 준공 ------------------------------------------ ‘12. 4

○ 4차분 준공 ------------------------------------------ ‘12. 9

○ 전체분 준공 ----------------------------------------- ‘14. 3

팔복배수지 건설 및 혁신도시 배수관 포설

○ 기존 송수관에서 직접 공급되는 조촌, 팔복, 동산동 지역에

간접 배수방식으로 공급하고,

○ 국가의 지역균형 발전계획에 따른 혁신도시, 법조타운, 장동, 　　　유통 단지 및 첨단산업단지 등의 생활용수를 안정적으로 공급하고자 함

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2009. 9 ~ 2013. 6

○ 위    치 : 전주시 덕진구 팔복동․만성동 일원

○ 총사업비 : 26,305백만원(국비9,315  시비16,990)

- 기투자 23,425백만원 (2012년 3,300백만원)

○ 사업규모

- 배수지 34,500㎥/일(생활용수 30,000㎥,  공업용수 4,500㎥)

- 송․배수관 매설 L= 11.4㎞(송수관5.4㎞  배수관6.0㎞)

□ 그간 추진상황

[팔복배수지 건설] : 공정률 40.2%

○ 팔복배수지 건설 설계용역 추진 ---------------- ‘09. 9~’10. 1

○ 팔복배수지 1차분(4,929백만원) 완료 ----------’10. 6~’11. 10

- 송ㆍ배수관 매설 L=3.9km중 2.5km완료, 배수지 토공 완료

○ 팔복배수지 2차분(6,500백만원) 추진 --------- ’11. 10~’12. 5

- 송ㆍ배수관 매설 L= 1.4km, 배수지 구조물 34,500㎥

[혁신도시 배수관 포설] : 공정률 67%

○ 혁신도시 배수관 포설 추진 -------------------- ’09. 9~’12. 12

- 배수관 포설 L=7.5km중 3.6km완료, 공업용수 가압장 설치 완료

□ 쟁점사항

○ 2012년 12월말까지 배수관을 포설하여 혁신도시 상수도 공급(농진청 시험포 및 대한지적공사 등)이 필요하나, 만성 복합단지 사업추진 　일시중단에 따른 대로1-16호선 조기 개설이 관건 임

□ 대    책

○ 2012년 준공 예정인 농진청 시험포 및 대한지적공사 등 수돗물 　공급은 완주군 이서배수지 및 금평저수지에서 임시적으로 공급　　방안을 강구 혁신도시 상수도공급에 차질이 없도록 조치

○ 만성복합단지 LH(전북개발공사)사업계획에 대로1-16호선을 우선적으로       2012년 상반기 토지보상이 이루어질 수 있도록 지속 협의

□ 추진일정

○ 팔복배수지 구조물 건설 --------------------- ’11. 11~’12.  5

○ 배수지 구조물 방수 및 부대시설 설치 ------ ’12. 6~’12. 12

○ 혁신도시 배수관포설 --------------------------- ’12. 6~’13. 3

○ 시험가동 및 전체사업 준공 -------------------------- ’13. 6

전주권광역상수도수수사업 지곡배수지 건설

○ 대성정수장 취수원인 임실오원천 주기적 물 분쟁 등 대성정수장     취수원 불안정으로 취수 중단시 평화동, 서서학동 고지대 지역의     급수불출 해소하고 배수지 건설로 안정적 용수공급 기여하고자함

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2011. 5 ~ 2013. 8

○ 위    치 : 전주시 완산구 평화동 2가 산104-4번지 일원

(급수구역 : 평화동, 서서학동, 삼천3동 50,000여 세대)

○ 총사업비 : 13,500백만원(공사 12,000 설계 550, 감리 및 기타 950)

- 기투자액 8,615백만원 ( 2012년 5,800백만원)

○ 사업규모 : 배수지 건설 V=15,000㎥, 가압장 신설 Q=30,000㎥/일

□ 그간 추진사항

○ 송수관로 매설 및 세관갱생 ------------------------- ’05~’06

- 우림교~삼천취수장간 관로매설 L=2.9km, D=600mm , 사업비 2,827백만원

- 삼천취수장~지곡정수장간 세관갱생 L=2.6km D=600mm, 사업비 860백만원

○ 중기지방재정계획 수립 ------------------------------- ’10. 8

○ 기본 및 실시설계 용역 추진 ----------------- ’11. 05.～’11. 12

□ 추진일정

○ 사업 발주 ------------------------------------------ ’12.  2

○ 총괄 계약 및 1차분 착공 ----------------------------- ’12. 3

○ 지곡배수지 건설 ----------------------------- ’12. 3.~’13. 8

소규모 배수관 포설 사업

○ 취락지역과 멀리 동떨어져 있어 상수도 공급혜택을 받지 못하고      지하수나 간이상수도를 음용수로 사용하고 있는 소규모 미급수지역에     상수도를 공급하여 행정신뢰도 제고 및 시민보건위생 개선

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2012. 1 ～ 2012. 12

○ 위    치 : 전주시 덕진구 송천동 장덕사 주변 등 8개소

○ 총사업비 : 500백만원

○ 사업규모 : 관로매설 L= 4.5km, D=16～100mm

□ 그간 추진사항

○ 위    치 : 중인동 도계마을 외 7개소

○ 사 업 량 : 배수관 포설 2.5km(D=50~100mm), 가압장 1개소

○ 사 업 비 : 320백만원

○ 수혜가구 : 110세대 (400여명)

□ 추진일정

○ 사업대상지 조사 측량 실시 ------------------- ’12. 1~’12.  2

○ 자체설계 및 일상감사 ------------------------ ’12. 2~’12.  3

○ 사업발주 및 착공 ---------------------------- ’12. 3~’12.  4

○ 소규모 배수관 포설 추진 ---------------------- ’12. 4~’12. 10

○ 급수시설 설치 및 사업 완료 ---------------- ’12. 10~’12. 12

노후관 교체 ․ 갱생 및 통합공사

○ 노후로 누수 및 적수 발생되는 관로를 교체 및 갱생 하여 유수율 향상 기여

○ 급수 다발관을 정비하여 안정적인 급수체계 구축 및 관망 관리 효율 도모

□ 사업개요

○ 기    간 : 2012. 1 ~ 2012. 12

○ 위    치 : 전주시 급수구역 일원 (맑은물공급사업 정비구역 제외)

○ 사 업 비 : 670백만원 (교체 251, 갱생 242, 통합공사 177)

○ 사업규모 : 관로 교체 1식, 갱생 1식, 통합공사 1식

○ 세부사업내역

구 분	교 체	갱 생	통합공사	비 고
위 치	덕진구 화전동 (삼례로)	완산구 효자동 (새내길)	완산구 효자동,중화산동 (안행2길․5길, 산월 1길)
사업량	L=800m (d=150mm)	L=700m (d=300mm)	L=680m (d=50~150mm)
매설년도	1982년 매설 PVC	1986년 CI 주철	급수관 정비 순환망 구축
사업비	251백만원	242백만원	177백만원

□ 추진일정

○ 사업대상 현지조사 및 측량 ----------------------- ‘12. 1~‘12. 2

○ 대규모 도로 굴착 심의 ----------------------------- ‘12. 2~’12. 3

○ 실시설계 및 공사 발주(교체, 갱생, 통합) ------------ ‘12. 3~’12. 4

○ 공사 준공 ------------------------------------ ‘12. 7~’12. 8

긴급누수복구 및 누수탐사

○ 상수도 시설물에서 발생하는 돌발적인 누수를 효율적으로 긴급 복구      함으로써 누수로 인한 예산낭비 방지 및 시민 불편 해소

□ 사업개요

○ 기    간 : 2012. 1 ~ 2012. 12

○ 위    치 : 전주시 전 급수구역 일원 (맑은물공급사업 정비구역 제외)

○ 사 업 비 : 503백만원 (긴급누수복구 470, 누수탐사 33)

○ 사업규모 : 누수 복구공사 350개소 (긴급누수복구 300, 누수탐사 50)

□ 그간 추진상황

○ ‘11년도 누수민원처리 : 3,242건

- 도급처리(도로누수) : 222건/ 474백만원

- 자체처리 : 3,936건 (누수 수리원 9명)

○ 누수탐사 추진 : 3개팀 9명/ 58개소(방지액 260,000천원)

- 자체 탐사 : 누수탐사 2팀 6명/ 34개소

- 용역 탐사 : 요역탐사 1팀 3명/ 24개소

※ 매주 목요일 야간 누수탐사의 날 지정 (급수과-8223호, 11.08.02)

□ 추진일정

○ 긴급누수복구 추진 -------------------------- ‘12. 1~’12. 12

- 사 업 비 : 470백만원

- 사 업 량 : 300개소 정도

○ 용역탐사 추진 -----------------------------ꡐ12. 3~’12. 11

- 용 역 비 : 33백만원 (복구비 : 긴급누수 사업비 활용)

- 사 업 량 : 50개소 정도

학교 등 맑은 수돗물 공급사업

○ 노후 옥내 급수관의 세척․갱생 또는 교체에 필요한 비용의 일부를       지원하여 맑고 깨끗한 물을 공급하고 시민의 건장증진에 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2010. 7 ~ 2014. 12(4개년)

○ 지원대상 : 학교, 주거용건물, 사회복지시설, 수급자 주택 등

- 배관의 내부가 부식되어 수질기준을 초과하는 경우

○ 지원근거 : 전주시 상수도 급수조례 제 39조(급수설비의 관리 책임 등)

○ 지원범위

- 학      교 : 공사비의 70%이하(최대 20백만원)

- 공 동 주 택 : 100세대미만(10백만원), 200세대미만(20백만원), 200세대이상(30백만원)

- 기초수급자 : 전액지원(최대 2백만원)

- 단 독 주 택 : 세대당 최대 30만원 이하(연면적 85㎡이하)

○ 사 업 비 : 800백만원(2012년 150백만원)

□ 그간 추진상황

○ 2010년 급수설비 지원사업 완료 : 인후현대아파트 외 6개소 (118,165천원)

○ 2011년 급수설비 지원사업 완료 : 평화주공2단지 외 5개소 (103,846천원)

□ 추진일정

○ 2012년 급수설비 개량 공사비 지원 세부계획 수립 ------- ‘12. 2

○ 급수설비 개량 공사비 지원접수 및 대상자 선정 ---------- ‘12. 3

○ 자체 급수설비 개량 공사 시행 ----------------- ‘12. 4~‘12. 12

○ 급수설비 개량 공사비 지원금 지급 -------------------- ‘12. 12

품질향상을 위한 완벽한 상수도 계량기관리

○ 유효만기․고장 계량기의 완벽한 교체를 통해 계량의 품질향상을 도모하고

계량기 고장 및 동파의 사전 예방조치 강화로 계량의 신뢰성 향상

□ 사업개요

○ 기    간 : 2012. 1. ~ 2012. 12

○ 사 업 비 : 387백만원

○ 사업규모 : 21,000개(계량기 교체)/ ※ 수도전수 :  211,486전

□ 추진일정

○ 유효만기 계량기 교체 -------------------------------------- ‘12. 1~’12. 12

- 대    상 : 19,000개(50㎜이하 18,987  50㎜초과 13)

※ 유효기간 : 50㎜이하 8년, 50㎜초과 6년

- 추진내용 : 직접교체(10,000개), 맑은물 공급사업(7,800개),

상수도 대행업체 교체(3,200개)

○ 고장 및 동파계량기 교체 ------------------------------ ‘12. 1 ~ ’12. 12      - 대    상 : 2,000개

- 추진내용 : 긴급복구반 연중(무휴) 운영(공휴일 1개반 2명근무)

○ 불량 Zero화를 위한 계량기 성능검사 ------------- ‘12. 1 ~ '12. 12

- 대    상 : 신규, 노후, 민원계량기 성능검사 실시 강화

- 추진방법 : 계량기 성능시험을 통해 불량계량기 색출 및 우수한 계량기 설치

○ 상습동파 세대 집중관리 -------------------------------------------- ‘12. 12

- 대    상 : 250세대(최근 5년내 2회 이상 동파발생)

- 관리방법 : 동절기 사전보온 조치(보온재 충전 및 동파방지 비닐설치 등)

수 질 관 리 과 소 관

ꊱ	『상수도 전면 광역화에 따른 시민우려 일소』 완벽한 안전성 검증과 민원처리 행정의 완성	--	23
ꊲ	공업용수 수요증가 추세에 따른 시설개량	--	24
	수돗물 생산․관리 ‘국내 최우수 지자체’ 타이틀 수성	--	25
	2012년 노약자 먹는 물(무료) 수질검사 확대	--	26

『상수도 전면 광역화에 따른 시민우려 일소』

완벽한 안전성 검증과 민원처리 행정의 완성

생활용수의 전면 광역화 경우, 민원처리행정 부실 등을 우려하는 시선의 불식을 위하여 ‘시민공감 안전체제’ 구축

□ 사업개요

○ 광역상수원 관리․정수처리공정에 적극적 참여방안 마련, 조기시행

○ 시민이 안전하다 공감할 수 있는 다양한 행정서비스(시책) 중점 추진

□ 추진상황

○ 광역상수도 안전성 검증

- 고산정수장 현지 원․정수 주기적 수질조사 [주간 15개, 월간 57개 항목]

- 광역 배수지, 수도꼭지 수 등 급수과정 모니터링 매일 실시 등

○ 국가공인 수질검사기관을 활용한 행정서비스 전개

- 품질인증제, 보육․사회복지시설 무료 수질검사, 수돗물 이동상담반 운영 등

□ 문제점 및 대책

○ 광역상수도 수처리공정 운영에 참여농도를 높여야 되는 환경 도래

⇨ 민원처리시스템의 일원화를 위한 전주시&수공 일체형 운영체제 조기정착

- ’14 광역화 대비뿐만이 아닌 주요민원의 해소책 운영여부 검증 필요

□ 금후계획

○ 광역상수도 생산과정 참여 및 공동관리 수자원공사 전북본부와 협의추진

- 전도․녹조현상으로 인한 이취․미, 흑수민원 적정대책 주도 추진 등

○ 모든 시민이 인지할 수 있도록 ‘수돗물 이동상담반’ 활성에 주력

- 시책 지속추진 & 주민센터와 연계, 물에 관한 순회 상담․불편 해소를 중점 추진함으로써 민원의 현장접수․처리행정을 널리 홍보

공업용수 수요증가 추세에 따른 시설개량

공업용수의 추가 수요계획에 부합하는 안정적 공급을 위하여 노후 생산 시설의 개량 추진

□ 사업개요

○ 전미취수장~팔복정수장 도수관로(주철관, D600mm) 확장교체

○ 도수관로 L=310m PE갱생(강관, D700mm) ⇐ '08부터 연차적 시행

구 간	관 종	관경(mm)	연장(m)	시설년도
계			7,672
전미취수장 ~ 팔복정수장	주 철	D = 600	3,847	1968
	강 관	D = 700	3,825	1989

○ 공업용수 취․정수장 노후 구축물 보수 및 환경정비

□ 추진상황

○ ’08~’11, 700mm 강관 갱생(1,900m/4년) ➠ 경작자 누수민원 감소

○ 유공관 퇴적토사 준설(’11.12) ➠ 취수량 증가(54,000㎥/일⇒ 65,000㎥/일)

□ 문 제 점

○ 도수관로(주철관, D600mm) 노후 및 관경협소로 취수용량 부족

○ 공업용수 취․정수장 노후 구축물과 열악한 ‘현장환경’ 안전 우려

□ 금후계획

○ 공업용수 취․정수시설 개량 및 효율적 유지관리 중점 추진

- 장래 용수수요량 확보를 위한 도수관 확장교체(D700mm, L=3.85km)

※ 2012년 초 용역 후 하반기 교체공사 착공(용역비 80백만원)

○ 구축물 보수, 현장내 통행로 개설 등 근무환경 개선(70백만원)

- 구축물 안전진단 결과에 따른 적정조치 및 위험설비의 안전관리 추진

수돗물 생산 ․ 관리 ‘국내 최우수 지자체’타이틀 수성

환경부 분석력 평가『4년 연속 최상위 검사기관』&『수도사업 운영․관리실태 시범평가』1위 도시의 저력을 다시 보여주는 2012 목표설정과 달성계획

□ 추진방향

○ 환경부 분석능력 평가 등 각종 평가에서 우수성적을 반드시 거양

○ 수도사업 운영․관리 ‘1등 지자체’ 위상에 걸맞은 고품질 수돗물 생산

○ 우수한 수질 분석력, 수처리 기술을 활용한 대시민 행정서비스 추진

□ 추진상황

○ 분석능력 평가 결과『’’08년～’11년, 4년 연속 최상위(만점) 기관』선정

○ ’11 환경부 주관, 수도사업 운영․관리실태 시범평가 결과 1위 선정

※ 우수한 수처리공정, 수질분석력의 대시민 서비스 활용이 평가에 반영

○ 다양한 먹는 물 관리 시책추진과 검사수수료 3억 수입(총37억/’00~)

○ 대성수계 상수원의 ‘오염에 취약한 환경’ 신속감지․대처시스템 구축

□ 금후계획

○ 중앙부처 각종 평가에 철저한 대비

- 검사기관 분석능력 배양을 위한 직무연찬 및 숙련도 제고 치중

- 효율․합리적 사업장 관리운영 주력 ⇨ 건설적 행정 정착 & 평가 대비

○ 시민이 365일 안심하는 ‘고품질 수돗물’ 생산

- 대성정수장, 적정 정수처리 및 급수과정별 정밀한 검증과정 체계화

- GC/MSD 등 첨단 분석장비 구입, 정밀분석 및 신속한 민원처리 시행

○ 전주시, 전북도내 안전한 먹는 물의 길잡이 ‘아성’ 자리매김

- 서비스(타 지자체․대시민) 추가 발굴, 기관홍보를 통하여 신뢰 & 세입 추구

2012년 노약자 먹는 물(무료) 수질검사 확대

사회적 노약자에 대하여 전국 최우수기관으로 선정된 국가공인 먹는 물 검사기관을 활용하여 무료 수질검사를 실시, 시민의 건강증진에 기여

□ 사업개요

○ 대    상 : 사회복지시설 187개소, 영유아보육시설 794개소

○ 운영방법

- 전문인력 2인 1조 「수돗물이동상담반」구성, 방문상담 및 시료채수

- 정수기수 및 수도꼭지수 검사 후 안전하게 음용하는 방법 안내

※ 항목 및 수수료 : 일반세균 등 먹는 물 수질기준 17개항목 (79,700원/건 면제)

□ 추진상황

○ 무료 수질검사 결과(’10년~’11년)

점검개소	사회복지시설		영유아보육시설		비 고
	적 합	부적합	적 합	부적합
627개소	67	6	500	54	일반세균 기준초과

○ 부적합 사유 : 정수기 필터 교체주기 미흡 및 관리소홀

○ 우리시 수돗물의 우수성 홍보 및 정수기 관리요령 등 교육

□ 금후계획

○『수돗물 이동상담반』활성 - 먹는물 검사기관의 전문 인력이 직접 방문하여 먹는 물에 관한 상담 및 시료채수

○ 수질검사 결과에 대한 정확한 분석 및 개인별 성적서 통보

- 수질검사 결과 기준에 부적합시 원인규명 및 안전음용 방법제시

※ 수돗물 안전성 홍보 및 음용을 적극 권장

하 수 과 소 관

ꊱ	하수처리편입구역 하수관거 정비사업	--	28
ꊲ	중앙처리구역 하수관거 정비사업	--	29
ꊳ	효자처리구역 하수관거정비사업	--	30
ꊴ	새만금유역 CSOs 및 초기우수 처리시설사업	--	31
ꊵ	전주하수처리장총인(T-P)처리시설설치사업	--	32
ꊶ	하수찌거기(슬러지)처리시설사업	--	33
	매암지구 마을하수도 정비사업	--	34
	진기지구 마을하수도 정비사업	--	35

하수처리 편입구역 하수관거사업

○ 전주․삼천 상류지역의 생활하수를 차집 하수처리장에 유입

○ 공공수역 수질오염 방지로 쾌적한 하천 수변 공간제공

○ 농촌동 마을하수도 개량으로 시민 보건위생 증진

□ 사업개요

○ 위    치 : 평화동 장교마을 등 48개 마을

○ 사업규모 : 관거신설 L=76.4㎞, 배수설비 2,045가구

○ 사 업 비 : 39,844백만원(국 19,790, 도 1,419, 시 15,627, 기금 3,008)

- 기   투   자 : 20,599백만원(국 12,694, 시 6,050, 기금 1,855)

- 2012년 예산 : 9,193백만원(국 1,619, 도 324, 시 7,002, 기금 248)

○ 사업기간 : 2008 ～ 2013(6개년)

□ 그간 추진상황 - 공정 47%

○ 지방재정 투융자심사완료(행정자치부) -------------- 2007. 10

○ 실시설계용역 및 행정절차 이행 ---------- 2007. 6 ～ 2008. 8

○ 5개지구(중복․전주천,평화,중인,박물관,월드컵경기장) 공사착공 --- 2008. 10

- 전체 L=76.4㎞ 중 L=36.3㎞ 완료

□ 금후계획

○ 잔여구간 년차별 사업추진  ---------------- 2013년 완료 예정

- 하수관거 L=40.1㎞, 배수설비 1,542가구

중앙처리구역 하수관거 정비사업

○ 노송천 자연형하천 복원사업 상류 오염원 차단으로 시민에게

생명력 있는 수변공간 제공

○ 하천수, 지하수, 우수등 불명수 감소로 하수처리비 절감

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 중앙, 풍남, 노송동일원(노송천복원사업 상류지역)

○ 사업규모 : 관거정비 L=27.6㎞, 배수설비 3,302가구

○ 총사업비 : 29,826백만원(국 14,913, 도 1,893, 시 10,783, 기금 2,237)

- 기   투   자 : 11,618백만원(국 5,445, 시 5,518, 기금 655)

- 2012년 예산 : 6,073백만원(국 2,094 도 418, 시 3,240, 기금 321)

○ 사업기간 : 2010 ～ 2013(4개년)

□ 그간 추진상황 - 공정 43%

○ 지방재정 투융자심사(전라북도) -------------------- 2008. 10

○ 실시설계용역 완료 ------------------------------ 2009. 3～8

○ 행정절차이행(재원협의, 설계자문, 일상감사등) 완료 ---  2009. 10

○ 공사계약 및 착공 ---------------------------------- 2010. 1

- 전체 L=27.6㎞ 중 L=10.1㎞ 완료

□ 추진계획

○ 잔여구간 년차별 사업추진 ----------------- 2013년 완료 예정

- 하수관거 L=17.5㎞, 배수설비 2,619가구

효자처리구역 하수관거 정비사업

○ 새만금 상류지역 목표수질 조기달성과 삼천 수질개선 시급

○ 하수관거 우․오수 분리와 건물 정화조 폐쇄로 시민보건 위생 향상

○ 하천수, 지하수, 우수 등 불명수 감소로 하수처리비 절감

□ 사업개요

○ 위    치 : 효자처리구역(효자동 일원), 하수처리장 주변마을 등

○ 사업규모 : 관거정비 L=25.0㎞, 배수설비 1,500가구

○ 총사업비 : 20,000백만원(국 10,000, 도 1,900, 시 6,600, 기금 1,500)

- 기   투   자 : 824백만원(국 500 시 273, 기금 51)

- 2012년 예산 : 4,042백만원(국 2,100, 도 420, 시 1,200, 기금 322)

○ 사업기간 : 2012 ～ 2014(3개년)

□ 그간 추진상황

○ 지방재정 투융자심사 완료(전라북도) --------------- 2009. 10

○ 용역과제 심의 완료 ------------------------------- 2009. 11

○ 실시설계용역 착공 -------------------------------- 2011.  2

○ 기초자료 수집 및 현지조사 측량 ------------------- 2011.  6

○ 지반조사 및 시설물 세부 설계 ---------------- 2011. 7.～12

□ 추진계획

○ 행정절차이행(재원협의, 설계자문등) ------------- 2012.1 ～ 2

○ 공사착공 및 완료 ----------------------- 2012. 3～2014. 12

새만금유역 CSOs 및 초기우수 처리시설 설치사업

○ 새만금 상류지역의 하수관거 분리사업 지연등에 따른 비점 오염원에서 발생한 초기우수가 미처리된 상태로 합류식 하수도에 유입 월류되어 수질오염이 가중되는 문제점을 보완하고 새만금 유역 목표수질 조기 달성

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 환경사업소내 및 마전교상류 좌안 둔치

○ 사업규모 : 저류조 2개소(130천㎥), 간이처리시설 3개소(41천㎥/일)

○ 사 업 비 : 69,698백만원(국 34,849, 도 6,970, 시 24,443 기금 3,436)

- 기   투   자 : 4,400백만원(국 3,249, 도 594, 시 281 기금 276)

- 2012년 예산 : 11,473백만원(국 6,800, 도 1,360 시 2,271, 기금 1,042)

○ 사업기간 : 2009년 ～ 2013년(5개년)

○ 사업 추진방법 : 민간대행사업 추진(한국환경공단)

□ 그간 추진상황

○ 협약체결(환경부, 전북도, 4개시군, 환경관리공단) ---- 2009. 8

○ 종합계획수립 및 타당성조사 용역완료 --------------- 2010. 2

○ 기본계획 및 입찰안내서 용역 완료 ------------------ 2010. 7

○ 시설공사 입찰공고 ----------------------------- 2010. 8~12

○ 실시설계 적격자 선정 및 우선시공분 계약  ------ 2010. 12~2011. 5

○ 1차분 공사추진 ----------------------- 2010. 12.~2011. 11

○ 2차분 공사계약 체결 ------------------------------ 2011. 11

□ 금후계획

○ 하수도 설치인가 및 재원 협의(전북도, 환경부) ----- 2011.9~2012. 1

○ 2차분 공사추진 ------------------------- 2011. 11~2012. 8

※ 주변 건물 계측 및 토사 반출(국도대체우회도로 현장, 친환경복합단지 조성현장 등)

○ 화산처리구역 하천점용 및 사유지 보상 협의 -------------- 2012. 1~5

전주 하수처리장 총인(T-P)처리시설 설치사업

○ 새만금 개발 기본구상 변경으로 담수호 부영양화 방지 및 목표수질 강화(2012.01.01.)에 따라 현재 운영 중인 우리시 하수처리장에 대하여 강화된 수질기준에 적합하게 운영 될 수 있도록 화학적 처리시설, 여과시설 및 소독시설 등을 도입하여 새만금 유역 목표수질 조기 달성

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 송천동2가 1035번지(전주시 환경사업소내)

○ 규    모 : 403천㎥/일, 총인(T-P) 2.0 ⇨ 0.2mg/L이하

○ 사 업 비 : 24,144백만원(국 12,082, 도 4,828, 시 6,000, 기금 1,242)

- 운영비 25억원/년

- 기   투   자 : 911백만원(국 530, 도 286, 시 51 기금 44)

- 2012년 예산 : 16,882백만원(국 9,462, 도 3,784 시 2,187, 기금 1,449)

○ 사업기간 : 2010 ~ 2013

□ 그간 추진상황

○ 하수처리장 인처리시설 설치사업 최초 추진계획 수립(국무총리실) ---- 2008. 12

○ 하수도법 개정 ------------------------------------------ 2010. 2

※ 하수처리장 방류수 수질기준 강화

○ 기본 및 실시설계 용역(기타공사) 착수 ------------------ 2010. 12

○ 용역 과업수행 일시정지 --------------------------------- 2011. 4

○ 사업추진방법 결정(기타공사 → 턴키공사) --------------- 2011. 11

※ 부시장님 주재 정책조정회의 개최

○ 대형공사 입찰방법 심의 -------------------------------- 2011. 12

※ 제6차 지방건설기술심의 위원회

□ 금후계획

○ 기본설계 및 실시설계용역 설계변경 시행 ----------------- 2012. 1

※ 기본계획 및 입찰안내서 작성용역으로 설계변경 추진

○ 입찰안내서 작성 및 심의 ----------------------------- 2012. 1～3

※ 전주시설계자문위원회 심의

○ 입찰공고 및 현장설명회 개최 ---------------------------- 2012. 3

○ 기본설계 적격심의(도) 및 실시설계 적격자 선정 ---------- 2012. 5

○ 공사착공 ----------------------------------------------- 2012. 7

○ 공사준공 ----------------------------------------------- 2013. 6

하수찌꺼기 처리시설 설치사업

○ 2012년부터 해양투기 금지정책에 따른 대책마련 필요

○ 하수찌꺼기의 안정적 처리로 자연환경 보전에 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 삼천동3가 749번지 일원

※하수슬러지 감량화시설은 전주환경사업소 내 설치

○ 규    모 : 건조 소각(150 ⇨ 65톤/일), 감량화(250 ⇨ 150톤/일)

○ 총사업비 : 40,150백만원(국비 20,075, 민간투자 20,075)

- 기   투   자 : 1,081백만원(국 1,081)

- 2012년 예산 : 11,910백만원(국 11,910)

○ 사업기간 : 2010 ~ 2014(5개년)

□ 그간 추진상황

○ 기본 및 실시설계 용역 착수 ------------------------ 2003. 8

○ 지역주민 반대로 용역 중지(공정율81%) ------------ 2004. 12

○ 공모방식에 의한 입지선정(안산,삼산마을인근) ------- 2008. 9

○ 민간투자 정부고시 사업으로 추진결정 --------------- 2009. 8

○ 민간투자 적정성조사 및 타당성조사 용역 ------------ 2010. 3

○ 시설사업기본계획 사전심의 --------------- 2010. 7~2011. 6

○ 민간투자사업 심의위원회 심의(기재부) ------------- 2011. 12

□ 금후계획

○ 시설사업기본계획 고시 ----------------------------- 2012. 1

○ 우선협상대상자 선정 및 협상실시 ------------------- 2012. 5

○ 실시협약 체결 및 사업시행자 지정 ----------------- 2012. 11

○ 공사착공 ----------------------------------------- 2012. 12

매암지구 마을하수도 정비사업

○ 새만금 상류지역의 하천수질을 조기에 개선하여 만경강 생태계를   복원, 성공적인 새만금사업 추진에 기여하고

○ 농촌마을 하수도 시설개량 및 우･오수 분리사업 추진으로 하수처리  효율을 극대화하여 주민의 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 성덕동 일원(매암 외 4개마을)

○ 사업규모 : 하수처리시설 Q= 190㎥/일, 하수관거 L= 8.7㎞

○ 사 업 비 : 4,989백만원(국비 3,492  시비 1,248  기금 249)

- 기   투   자 : 2,308백만원(국비 1,767, 시비 434, 기금 107)

- 2012년 예산 : 852백만원(국비 122, 시비 722, 기금 8)

○ 사업기간 : 2009년 ～ 2013년

□ 그간 추진상황

○ 하수도정비기본계획변경 승인(환경부) --------------- 2007. 7

○ 실시 설계용역 완료 -------------------------------- 2009. 9

○ 공공하수도 인가신청 및 재원 협의 ------------------  2009. 9

○ 지방재정투융자심사(전라북도) 완료 ---------------- 2009. 11

○ 인가 및 공사발주(조달청) ------------------------- 2009. 11

○ 1차 ~ 4차 공사추진 완료 ------------- 2009. 12~2011. 11

※ 하수관로(3.05km) 매설 및 하수처리장(190㎥/일) 설치

□ 금후계획

○ 잔여분 공사추진 ------------------------- 2012. 3～2013. 9

※ 하수관로(5.65km) 매설 및 배수설비(282개소) 설치

○ 시운전 및 준공 ------------------------ 2013. 10～2013. 12

진기지구 마을하수도 정비사업

○ 새만금 상류지역의 하천수질을 조기에 개선하여 만경강 생태계를   복원, 성공적인 새만금사업 추진에 기여하고

○ 농촌마을 하수도 시설개량 및 우･오수 분리사업 추진으로 하수처리  효율을 극대화하여 주민의 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 전미동 일원(진기외 3개마을)

○ 사업규모 : 하수처리시설 Q= 70㎥/일, 하수관거 L= 6.0㎞

○ 사 업 비 : 3,360백만원 (국비 2,352  시비 909  기금 99)

- 기   투   자 : 64백만원(국비 61, 기금 3)

- 2012년 예산 : 516백만원(국비 338, 시비 178)

○ 사업기간 : 2010년 ～ 2013년(4개년)

□ 그간 추진상황

○ 하수도정비기본계획변경 승인(환경부) --------------- 2007. 7

○ 지방재정투융자심사(전라북도) 완료 ---------------- 2008. 10

○ 2010년도 국가예산 신청 --------------------------- 2009. 3

○ 실시 설계용역 완료 -------------------------------- 2009. 9

○ 공공하수도 인가신청 및 재원협의 ----------------- 2009. 11

○ 진기지구 하수처리장 예정지 보상협의 통보 ---------   2010. 3

○ 진기마을 주민설명회 ------------------------------- 2010. 6

※ 진기마을 주민 하수처리장 설치반대 의견

○ 진기마을 주민 사업반대 민원제기 ------------------- 2011. 3

※ 저지대 침수 및 악취발생 우려 등 하수처리장 설치반대

□ 금후계획

○ 주민설명회 개최 및 사업구역 변경 관련 환경청 협의--- 2012. 2

※주민의견 수렴 내용 및 환경청 협의 내용 실시설계 반영

○ 입찰공고 및 계약체결 ------------------------------ 2012. 3

○ 공사착공 및 준공 ----------------------- 2012. 3～2013. 12